제319회 제주특별자치도의회임시회

환경도시위원회

2014. 7.

“자연·문화·사람의 가치를 키우는 제주”

주요업무보고

도로관리사업소

목      차

Ⅰ.	일반현황
□	기구 및 정ㆍ현원 현황
□	주요기능
□	관리도로 현황
□	2014 예산현황
Ⅱ.	민선6기 정책목표 및 방향
Ⅲ.	공약사항 추진계획
Ⅳ.	2014년 주요업무 추진계획
1	평화로 집중 관리 강화
2	남조로 위험도로 구조개선
3	불합리한 도로구조 개선
4	포장도로 덧씌우기 및 차선도색
5	도로표지판 및 교통안전시설물 정비
6	자연재해에 강한 도로 관리
7	「운행제한차량」단속 효율화
8	공정하고 신뢰받는 건설공사 품질 관리

Ⅰ. 일 반 현 황

■ 기구 및 정ㆍ현원 현황

□ 기  구 : 2개과 ( 도로안전관리과, 보수과 )

□ 정․현원 : 77명 / 75명

(정원 / 현원)

구분		계	일 반 직							기 타 직
			소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계	청원경찰	무기계약
계	정원	77	39	1	2	5	15	6	10	38	1	37
	현원	75	38	1	2	4	18	13	-	37	1	36
	과부족	△2	△1			△1	3	7	△10	△1		△1

■ 주요기능(사무 분장)

□ 구(舊) 국도 및 지방도 18개노선 626㎞ 유지관리

□ 건설관련 시험실 운영

■ 관리도로 현황

구 분	노선수	연장(km)	비 고
계	18개노선	626.72
구(舊)국도	5개	339.94	5.16도로, 1100도로 평화로, 일주도로, 중산간도로
국도대체 우회도로	2개	15.33	애월~아라, 상창~중문
국가지원 지방도	1개	26.45	번영로
지방도	10개	245.0	비자림로,남조로 등

■ 예 산 현 황

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별			비 고
	계	국 비	지방비
계	31,815	28,503 (89.6%)	3,312 (10.4%)
구(舊)국도 유지관리	27,813	27,813	-	특별행정기관 이전경비 (국토교통부)
지방도 유지관리	2,622	-	2,622
위험도로 구조개선	1,380	690	690	(안전행정부)

Ⅱ. 민선6기 정책목표 및 방향

■ 전략목표 및 실천전략

목 표		안전한 도로·쾌적한 도로· 아름다운 도로

실천전략		실 천 과 제
이용자 중심의 안전한 도로관리		□ 평화로 집중 관리 □ 남조로 위험도로 구조개선 □ 불합리한 도로 구조개선
쾌적한 도로정비		□ 포장도로 덧씌우기 및 고휘도 차선도색 □ 도로표지판 및 교통안전시설물 정비
이용자 편의를 위한 도로 행정		□ 자연재해에 강한 도로 관리 □ 「운행제한 차량」단속 효율화 □ 공정하고 신뢰받는 건설공사 품질관리

Ⅲ. 공약사항 추진계획

■ 고휘도 우천형 차선 도입

□ 목  표

□ 교통사고율이 높은 야간 및 우천시에도 차선이 또렷하게 보이는 『우천형   고휘도 융착식 차선』 도입을 통한 도민과 관광객의 교통안전 도모

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2014 ~ 2018

□ 소요예산 : 90억원(광특 60억, 지방비 30억)

□ 사업내용

- 우천형 고휘도 차선 도색사업 추진 L=626km

- 횡단보도주변 무단횡단 가드레일 설치 등 25개소

□ 추진계획

【2014년도】

□ 고휘도 융착식 차선도색 ⇒ L=64km,  1,065백만원(5.16, 평화로, 일주도로)

□ 가드레일 설치 ⇒ 5개소, 100백만원

【2015년이후】

□ 고휘도 융착식 차선도색 ⇒ L=562km,  7,435백만원

□ 가드레일 등 교통안전시설 ⇒ 20개소,  400백만원

□ 기대효과

□ 야간 및 우천시에 도로이용자에게 안전하고 편리한 도로환경 제공

으로 관광도시 면모 일신

Ⅳ. 주요업무 추진상황

실천과제 1		평화로 집중 관리

□ 도로 안전시설물 확충으로 사망사고 없는 도로 상시 유지

※ 평화로 위험구간 개선으로 (‘10) 6명 → (’11) 1명 → (‘12) 1명 → (’13) 0명

□ 사업개요

❍ 주요사업 내용

- 시인성이 뛰어난 고휘도 차선 도색 25.7㎞

- 노후된 단면 안개등을 양면으로 개선 ( 24개 )

- 델리네이터 및 표지병 정비 1식

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 11

❍ 사 업 비 : 1,000백만원 (국비)

□ 추진상황

❍ 2014. 3월 : 가로등 정비 22개소

❍ 2014. 6월 : 새별오름인근 안개등 개선(24개)

□ 향후 추진계획

❍ 2014. 7 ∼8월 : 고휘도 융착식 차선도색 25.7km

❍ 2014. 7 ~ 11월 : 안전시설물 지속 정비 29km

실천과제2		남조로 위험도로 구조개선

□ 도로 포장폭 협소로 차량 통행불편, 특히 겨울철 제설작업시 차량 교행이

되지 않아 안전사고 빈발

☞ 교통사고 발생건수(인명피해) : ’11년 19건(43명),  ‘12년 8건(10명),  ‘13년 6건(10명)

□ 사업개요

❍ 위  치 : 서귀포시 남원읍 수망리 일원(붉은오름~수망교차로)

❍ 내  용 : 위험도로 구조개선 5.7㎞ (도로 포장폭 확장 6m⇒10m)

- 교통안전시설확충 (고휘도차선, 발광형표지판 등)

- 상습 정체구간 오르막차로 신설 L=1.9㎞

❍ 기  간 : 2014. 1 ~ 2015. 10

❍ 총사업비 : 2,000백만원(국비1,000 지방비1,000)

※ 2014사업비 : 1,380백만원(국비690 지방비690)

□ 추진상황

❍ 2014. 1월 : 실시설계용역 발주

❍ 2014. 4월 : 유관기관 및 해당마을 사전협의 완료

❍ 2014. 5월 : 계약심사 및 전체분 공사발주

❍ 2014. 6월 : 1차분 공사계약 및 착공

□ 향후 추진계획

❍ 2014. 6 ~ 2015. 2월 :  1차분 공사완료 ( L=2.96㎞ )

❍ 2015. 2 ~ 2015. 10월 : 2차분 공사추진 ( L=2.74㎞ )

실천과제 3		불합리한 도로구조 개선

□ 도로선형이 불합리한 지점, 교통사고 잦은 곳 구조 개선

□ 시설물 정기점검결과 보수․보강이 필요한 교량 정비

□ 사업개요

❍ 위  치 : 구(舊)국도 및 지방도일원

❍ 내  용

- 위험도로 구조개선 3개소 (상가리,가시리,토산리)

- 교차로 개선 3개소 (종달리, 오조리, 태흥리)

- 교통사고 잦은곳 개선 2개소 (김녕중후문, 한림 대림4가)

- 교량보수·보강 13개소 (추자교외 12개소)

❍ 기  간 : 2014. 1 ~ 2014. 12

❍ 사업비 : 6,115백만원(국비5,615 지방비500)

□ 추진상황

❍ 2014. 2월 : 실시설계 완료

❍ 2014. 3월 : 유관기관 및 해당마을 사전협의

❍ 2014. 5 ~ 6월 : 사업 발주 및 착공

□ 향후 추진계획

❍ 2014. 7 ~ 12월 : 도로구조개선 공사 완료

실천과제 4		포장도로 덧씌우기 및 차선도색

□ 제95회 전국체전을 대비하여 조기 마무리, 제주를 방문하는 선수와 임원, 관광객, 도민에게 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

❍ 주요사업 내용

- 재 포장(덧씌우기) 62.5㎞

․구(舊)국도 3개노선 53.9㎞,  지방도 10개노선 8.6㎞

- 차선도색 88.8㎞

․구(舊)국도 4개노선 71.8㎞,  지방도 10개노선 17㎞

❍ 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 8

❍ 사 업 비 : 12,775백만원 (국비11,675  지방비 1,100)

□ 추진상황

❍ 2014. 3 ~ 6월 : 포장보수공사 추진 L=62.5㎞

❍ 2014. 6월 : 차선도색사업 발주 L=71.8㎞

□ 향후 추진계획

❍ 2014. 7 ~ 8월 : 전국체전 대비 사업 조기 마무리

실천과제 5		도로표지판 및 교통안전시설물 정비

□ 안개· 집중호우 등 불규칙한 기후변화 등에 대응할 수 있도록 안전하고 편리한 도로환경 조성

□ 사업개요

❍ 주요사업 내용

- 발광형 교통안전시설물 및 가드레일 등 정비 1식

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 12

❍ 사 업 비 : 1,015백만원 (국비 765  지방비 250)

□ 추진상황

❍ 2014. 2 ~ 6월 :  주요도로 위험요소 사전 제거

- 도로경계석 7개노선 416개소 정비 , 교차로 지점안내표지판 설치 52개소

- 교통사고 다발지역에 우선 충격흡수시설 설치 ( 7개소 )

□ 향후 추진계획

❍ 2014. 7 ~ 12월 : 년중 지속적 점검과 정비 추진

실천과제 6		자연재해에 강한 도로 관리

□ 원활한 교통소통 및 도로이용 불편 최소화를 위한 적기 도로제설

□ 도로침수 사전 방지를 위한 주요도로 배수시설 정비

□ 사업개요

❍ 주요사업 내용

- 제설을 위한 현장 대응팀 운영, 3팀 42명 ( 04:00부터 작업 )

- 태풍 등 기상특보에 따른 대응팀 운영 (D-2일부터 단계별 근무)

- 배수로 정비 8개 노선

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 12

❍ 사 업 비 : 6,687백만원 (국비 6,133 지방비 554)

□ 추진상황

❍ 2014. 3 ~6월 : 배수로 정비공사 추진 11개소, L=4.4㎞

□ 향후 추진계획

❍ 2014.  7 ~ 12월 : 공사 마무리 및 동절기 제설작업 추진

실천과제 7		「운행제한차량」단속 효율화

□ 도로·교량 등 도로구조물에 치명적인 손상을 주는 과적을 근본적      으로 차단하여 교통사고 예방 및 시설 유지보수 비용 경감

□ 사업개요

❍ 대상차량

- 축하중 10톤, 총중량 40톤 초과 / 폭 2.5m, 높이 4.2m, 길이 16.7m 초과

❍ 단속반 편성 : 2개조ㆍ8명

❍ 단속장비 : 차량 2대, 축하중 축중계 6조, 카메라 2대

□ 단속현황

연도별	계근대수	적발대수	조 치 내 역			비 고
			소 계	검찰송치	과태료부과
계	18,436	95	95	1	94
2013	6,418	25	25		25
2012	6,006	37	37	1	36
2011	6,012	33	33		33

□ 추진상황

❍ 2014. 1 ~ 6월 : 계근 실적 : 3,041대,   적발 13대

□ 향후 추진계획

❍ 매일 위치 무작위 선정 단속 실시 : 2개조 동·서지역 구분 단속

❍ 공휴일, 야간 단속 실시 : 감귤 출하기 주1회 이상 실시

실천과제 8		공정하고 신뢰받는 건설공사 품질 관리

□ 건설공사의 품질향상 도모 및 부실공사 사전 예방

□ 자재․부재 사전점검으로 부적정 자재의 현장반입 미연 방지

□ 현 황

❍ 시험실위치: 사업소 내(시험실 A=197㎡, 사무실 A=14㎡)

❍ 시험기구: 만능재료 시험기 등 74종(140대)

❍ 시험종목: 함수량 등 55종목

❍ 시험요원: 4명

❍ 시험수수료: 5,600(함수비) ～ 804,200원(실내CBR)

□ 운영실적

(단위: 천원)

구 분	2012년	2013년	비고
건 수	237	289
수 수 료	28,516	28,514

□ 추진상황

❍ 2014. 1~ 6월 : 시험건수 90건/ 수수료수입 8,661천원

❍ 2014. 6월 : 골재 및 순환골재 생산업체 적정성 점검 및 재료검사

□ 향후 추진계획

❍ 2014. 7 ~ 12월 : 시험건수 200건/ 수수료수입 : 30,000천원

❍ 2014. 11월 : 레미콘/아스콘 생산업체 적정성 점검 및 재료검사