제324회 제2차정례회 제2차 본회의

2014. 11. 19.(수) 10:00

손유원 의원 질문에 대한

서면답변서

손 유 원 의원님께서

1. 제주시 동북 지역 균형발전과 스포츠 인프라 확충 차원

에서 함덕야구장 조성과 관련하여 추진계획에 대하여

【답변내용】

동부지구(함덕) 야구장 건립사업 추진계획

❏ 사업개요

❍ 위    치 : 제주시 조천읍 함덕리 1594-2번지 일원

❍ 사업규모 : 부지면적 39,147㎡,

- 시설내용 : 야구장 1면, 실내연습장 등

❍ 사 업 비 : 3,800백만원(‘13. 2회 추경시 1,000백만원 반영)

❍ 사업기간 : 2013. 12 ~ 2016. 12

❍ 사업주체 : 제주시(스포츠진흥과)

❏ 추진상황

❍ ‘13.  10. 4 : 제주특별자치도 공유재산 관리계획 완료

- 부대의견 : 보조야구장 부지 확보 및 국비를 최대한 많이 받을 수 있도록 조치

❍ ‘13. 11. 8 : 공유재산 심의 제주특별자치도의회 의안의결

❍ ‘14. 3.  5 : 전략환경영향평가 용역 착공

❍ ‘14. 3. 17 : 도시계획시설(체육시설) 결정용역 착공

- 재해영향성 검토 1식, 문화재 지표조사 1식, 교통성 검토 1식, 경관위원회 심의 1식 등

❍ ‘14. 7. 17 : 기본 및 실시설계용역 착공

※ 편입토지 13필지 중 3필지 보상완료, 편입토지 6필지는 강력 반대 입장

❏ 향후계획

❍ ‘14. 12월 : 2014년도 제2회 추가경정예산 500백만원 확보 추진(제주시)

❍ ‘14. 12월 : 도시계획시설(체육시설) 결정용역 및 전략 환경 영향평가 완료

❍ ‘15.  1월 : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ ‘15.  2월~12월 : 문화재 시굴조사 · 문화재 표본조사 및  편입용지 보상 지속추진

손 유 원 의원님께서

2. 국내 신성장 유망기업 100곳에 서신발송과 관련한

성과에 대하여

【답변내용】

❍ 제주 환경에 적합하고 고용창출이 높은 국내 신성장기업 100곳을 대상으로 서한문을 발송 하였음.

- 발송대상 : 정보통신, 바이오, 에너지, 게임산업 등 국내 100개 기업

❍ 이는, 서한문을 받은 5개 기업의 제주 이전 결정을 촉진하는 계기가 되었음

- 5개 기업(반도체 1, IT 3, BT 1)

❍ 그 중 경기도 소재 IT기업 2개소는 제주 투자 잠재기업으로 지속적으로 관리해 나갈 계획임