제337회 제주특별자치도의회 임시회

농 수 축 경 제 위 원 회

2016. 2월

주 요 업 무 보 고

순   서

Ⅰ. 일반현황

Ⅱ. 비전과 목표

Ⅲ. 2016년 주요업무계획

□ 공공주도 풍력자원 개발사업 추진

□ 동복·북촌 풍력발전단지 2단계 조성사업

□ 공공시설 건축물 활용 태양광발전 시범사업

□ 바이오매스 발전 플랜트 건설사업

□ 국제 공인시험기관 운영 및 시험분야 확대

□ 풍력발전단지 리파워링(Repowering) 사업

□ 에너지복지 지원사업 추진

□ 신재생에너지홍보관 운영 활성화

Ⅳ. 2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅰ. 일  반  현  황

1		기구 및 정·현원

□ 기    구 :  : 2부 1센터 5팀

															사 장
	이 사 회																										감사(비상임)
	경영관리부														사업운영부												에너지연구기술센터
전략 기획팀								경영 지원팀						사업 개발팀						운영 관리1팀						운영 관리2팀

□ 정․현원

(단위 : 명)

구 분	계	사장	1~2급	3급	4급	5급	6급	계약직
정 원	42	1	1	2	7	15	11	5
현 원	35	1	1	0	3	14	11	5

※ 공사설립일 : 2012. 7. 4.

2		부서별 주요업무

부 서		주 요 분 장 사 무
경영관리부	전 략 기획팀	❍ 장·단기 경영전략 및 경영계획 수립 추진 ❍ 조직 및 정원관리, 규정 제․개정, 감사업무 ❍ 예산편성 및 내․외부 평가, 성과관리 ❍ 홍보․대외협력 업무 ❍ 이사회 운영 및 의전․행사 관리 ❍ 자금운용계획 수립 및 수입
	경 영 지원팀	❍ 기업회계 결산, 세무업무, 공사․용역․물품 구매/계약 ❍ 지출 및 회계, 재산․물품 관리 ❍ 인사/노무 및 교육훈련, 급여․복리후생 지원 ❍ 신재생에너지홍보관 운영관리 및 활성화 ❍ 정보화 시스템 구축·운영
사업운영부	사 업 개발팀	❍ 육·해상풍력 등 신재생에너지 신규사업 추진 ❍ 사업 확대를 위한 대내·외 협력 사업 ❍ 발전단지 주변지역 지원사업 추진 ❍ 신재생에너지공급인증서(REC) 관리 및 판매
	운영관리 1팀	❍ 각 풍력발전단지 운영계획 수립 및 효율적 운영 ❍ 풍력발전기 이용률, 가동률 관리로 수익 극대화 ❍ 기술력 축적을 통한 고장조치 신속화
	운영관리 2팀	❍ 동복·북촌 풍력발전단지 운영계획 수립 및 효율적 운영 ❍ 동복·북촌 풍력발전기 출력성능 관리 ❍ 154kV 변전실 운영관리 ❍ 바이오매스 발전 플랜트 건설사업 추진
에너지연구 기술센터		❍ 풍력발전시스템 성능평가 및 성능보증시험 수탁 ❍ 공인시험기관 운영 및 시험분야 확대 ❍ 풍력발전시스템 성능시험 기술개발 ❍ 풍력자원 조사 및 형식시험장 구축 ❍ 신재생에너지관련 기술개발 및 연구과제 수행

3		재정운용 현황

□ 예산규모 : 25,158백만원

(단위 : 백만원)

수 입			지 출
사업수입	풍력발전전력판매	16,984	사업비용	영업비용	9,853
				영업외비용	1,206
	태양광전력판매	63
				법 인 세	300
				예 비 비	100
	공급인증서판매	5,727
			자본지출	투자자산	114
	이자수입	46
				유형자산	8,696
	기타영업외수익	207
				무형자산	75
자본수입	기타유동부채수입	131		유동부채상환금	131
				비유동부채상환금	4,479
이 월 금	순세계잉여금	2,000
				예 비 비	204
합 계		25,158	합 계		25,158

□ 재무상태

(단위 : 억원, %)

연도별	재무구조			부채 중 차입액 (차입부채)	당기순손익	부채비율 (A/B, %)
	자산	부채(A)	자본(B)
2013년	726.69	36.67	690.02	0	24.56	5.2
2014년	914.61	196.45	718.16	163.00	28.14	27.4
2015년 예상	1,310.27	581.92	728.35	550.00	10.19	78.9

□ 자본금 : 663억원(제주특별자치도 현물출자 100%)

구 분	출자기관	납 입	위 치	규 모 (MW)	출자용도	출자유형	출자금액 (백만원)
΄12.7.4	제주특별자치도	설립 자본금	행원, 신창	12.25	전력생산	현물출자	8,063
΄12.11.23	제주특별자치도	증자	김녕, 가시리	16.5	전력생산	현물출자	58,262
합 계				28.75			66,325

4		주요시설 현황

□ 신재생에너지 시설

구 분	지 역	수 량		규 모
풍 력 발 전 · 태양광 발 전	행 원	12기	660㎾×5기(΄01년,΄03년)	11,450㎾
			750㎾×4기(΄00년,΄02년)
			1,500㎾×1기, 2,000㎾×1기(΄12년)
			1,650㎾×1기 (΄13년)
	신 창	2기	850㎾×2기(΄06년)	1,700㎾
	김 녕	1기	750㎾×1기(΄10년)	750㎾
	가 시 리	13기	1,500㎾×7기(΄12년)	15,000㎾
			750㎾×6기(΄12년)
	동복․북촌	15기	2,000㎾×15기(΄15년)	30,000㎾
	태 양 광(행원)	1식		506㎾
	합 계	풍력발전기 43기, 태양광 1식		59,406㎾
송전선로	행원 ~ 성산변전소	1식		24.5㎞
	가시리 ~ 표선변전소	1식		6.15㎞
	동복 ~ 조천변전소	1식		1.77㎞
	합 계	3식		32.42㎞

□ 신재생에너지홍보관

∙ 위    치  : 제주시 구좌읍 해맞이해안로 712-3 일원

∙ 사  업  비 : 70억원(국비 36억원, 지방비 24억원, 기금 10억원)

∙ 건설기간 : ΄08. 1 ~ ΄10. 5월

∙ 규    모  : 1,719㎡(연면적 2,467㎡,지상 2층)/대지면적 25,306㎡

∙ 주요시설 : 신재생에너지 전시·홍보시설, 체험교육공간, 4D영상관, 야외광장 등

∙ 주요기능 : 체험중심의 신재생에너지 교육·홍보를 통한 이해도 및 사회수용성 증진

∙ 연도별 이용현황

연 도	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	비 고
관람인원(명)	31,692	31,851	35,076	35,980	30,547

Ⅱ. 비 전 과  목 표

1		2022 비전 및 목표, 실천전략

미 션		지역에너지 자원을 활용하여 제주의 미래를 이끈다

비 전		‘탄소 없는 섬, 제주’를 선도하는 최고의 창조적 공기업

목 표		육상풍력 168MW 해상풍력 702MW	이용률 육상 25%, 해상 35%	KOBEX AAA 공기업경영평가 1위

가치

준거

핵심가치

경영방침

인재 존중	도전 정신	창의 혁신	사회 공헌

공익적 창의성 우선	실질적 성과지향	사규에 의한 공정한 관리	소통과 화합

실천전략		실천과제
풍력사업의 안정적 추진		❍ 육상풍력단지 지속 확장 ❍ 해상풍력사업 추진 ❍ 발전단지의 능률적 운영
미래 성장기반 확보		❍ 신재생에너지사업의 다각화 ❍ 성장동력 기술 확보 ❍ 상생 협력사업 활성화
공사 경쟁력 확보를 위한 핵심역량 강화		❍ 인사/조직체계 고도화 ❍ 인적자원 역량 향상 ❍ 재무관리 강화
지속가능 경영체계 구축		❍ 대외인지도 제고 ❍ 선진 윤리경영체계 확립 ❍ 사회적 기여도 제고

Ⅲ. 2016년 주요업무계획

1. 공공주도 풍력자원 개발사업 추진

❍ 풍력자원의 공공적 관리와 공익적 가치 향상으로 주민수용성을 제고하여 풍력발전사업의 원활한 추진

❍‘탄소 없는 섬, 제주’실현 및 에너지 자립 기반 조성

□ 사업개요

□ 사업기간 : ΄15. 9. 25. ~ ΄22. 12. 31.

□ 사 업 비 : ΄16년 700백만원

□ 사업규모 : 육상풍력 151MW(동복․북촌 2단계 24MW 포함), 해상풍력 702MW

□ 추진방법

∙ 육상풍력은 공사 또는 향토기업이 참여하여 지역공동체 재정자립 지원사업으로 추진

∙ 해상풍력은 공사 직접투자 또는 투자자 유치공모를 통한 최대 이익공유화 제안업체 선정 추진

□ 추진상황

□ 풍력발전지구 및 사업시행예정자 지정 : ΄15. 9. 25.

□ 풍력발전지구 지정 후보지 공모 실시 : ΄15. 10 ~ 12월

□ 1차 공모를 통한 풍력발전지구 후보지 선정 : ΄16. 1월

∙ 육상 1개, 해상 2개 후보지 선정/ 추가 해상 1개는 공사가 직접 추진 예정

□ 이후 추진계획

□ 1차 후보지 대상 풍력발전단지 지구지정 절차 이행

※ 육상풍력은 ΄17년, 해상풍력은 ΄19년 준공 추진

□ 공공주도 풍력개발 지속 확대 추진

□ 기대효과

□ 풍력발전수익의 도민 수익전환으로 지역주민 복지증진 및 소득증대 기여

□ 풍력발전사업 활성화에 따른 새로운 성장기반 마련으로 지역경제 활성화 기여

2. 동복·북촌 풍력발전단지 2단계 조성사업

❍ 동복·북촌 풍력발전단지 준공 후 24㎿규모의 2단계 사업을 추진하여 도내 최대 규모인 54㎿ 풍력발전단지 조성

❍ 기존단지의 기반시설을 공유함으로써 비용을 절감하고 민원을 최소화하여 사업 추진

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2017. 12월

□ 사 업 비 : 59,100백만원(΄16년 1,940, ΄17년 57,160백만원)

□ 사업규모 : 24MW(2MW × 12기 또는 3MW × 8기)

□ 사업위치 : 제주시 구좌읍 동복리 산56번지 일원(약 900,000㎡)

□ 계통연계 : 동복·북촌 풍력발전단지 변전소 활용(지중선로 약 3km)

□ 추진상황

□ 사업타당성 조사 실시(지방공기업평가원) : ΄15. 5 ~ 8월

∙ 조사결과 투자 타당성 확보 : 내부수익률 9.03%, B/C ratio 1.15

□ 도의회 신규 투자사업 타당성 검토(재원조달 방안) 심의 : ΄15. 9. 14.

□ 행정자치부 지방공사채 발행 승인 완료 : ΄15. 11. 24.

□ 이후 추진계획

□ 주민설명회 개최 : ΄16. 2월

∙ 동복리 개발위원회 및 청년회에서 마을총회 상정 의결

□ 풍력발전단지 지구지정 및 인허가 절차 이행 : ΄16. 2 ~ 10월

□ 공사 착공 : ΄16. 10월 / 공사 준공 및 상업운전 개시 : ΄17년

□ 기대효과

□ 연간 49,628MWh 전력생산으로 연간 100억원이상의 수익 창출 및 청정에너지 확보

□ 주변지역 마을지원 및 이익 공유를 통한 지역경제 활성화에 기여

3. 공공시설 건축물 활용 태양광발전 시범사업

□ 제주시 공공시설 및 유휴부지를 활용한 태양광 발전사업 추진

□ 사업다각화를 통한 신재생에너지 보급 확대와‘탄소 없는 섬, 제주’실현에 기여

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2016. 3 ~ 10월

□ 사 업 비 : 1,250백만원

□ 사업규모 : 태양광발전 500kW 내외

□ 사업위치 : 제주시 관내 공공시설물 활용

□ 추진상황

□ 제주시 공공시설 사업장 선정 협의(제주시 스포츠진흥과, 지역경제과) : ΄15. 8월

□ 타당성 조사 및 기본설계 용역 실시(㈜선진엔지니어링) : ΄15. 10 ~ ΄16. 2월

∙ 제주시 체육시설 및 오일장 등 시설별 사업규모 검토

∙ 경제성을 반영하여 태양광 발전설비 최적 배치 및 설계

□ 이후 추진계획

□ 제주시와 공공시설 활용 태양광발전사업 업무협약 체결 : ΄16. 2월

□⌜국토의 계획 및 이용에 관한 법률⌟ 등에 의한 인허가 신청 : ΄16. 3월

□ 준공 및 상업운전 : ΄16. 10월

□ 기대효과

□ 연간 약 657MWh의 전력을 생산하고 온실가스배출 308톤 저감 효과

□ 제주시 세입증대 기여 : 태양광발전 매출액의 5% 배분 예정

4. 바이오매스 발전 플랜트 건설사업

□ 도내 소나무 재선충병에 의한 고사목 등 폐목재를 활용한 바이오매스 발전사업으로 사업다각화를 통한 새로운 수익창출

□ 사업개요

□ 사 업 기 간 : 2016. 1 ~ 2018. 12월

□ 예상사업비 : 40,000백만원

□ 사업규모

∙ 바이오매스 발전소 : 9.9MW

∙ 바이오매스 연료생산설비 : 최대 100톤/일

∙ 발전연료 : 폐목재, 재선충병 소나무, 우드칩 혼합

□ 추진상황

□ 바이오매스 발전 플랜트 건설 후보지 선정 및 사업계획(안) 수립 : ΄16. 1월

□ 이후 추진계획

□ 바이오매스 발전 플랜트 건설 사업타당성 조사 : ΄16. 3월

□ 기본설계 및 사업비 도출 : ΄16. 6월

□ 주민설명회 및 의견수렴 : ΄16. 10월

□ 인허가관련 사전 협의 및 인허가 추진 : ΄16. 10월

□ 기대효과

□ 연간 약 71,726MWh의 전력생산으로 온실가스배출 33천톤 저감 효과

□ 발전소주변지역지원에 관한 규정에 따른 지원금 등으로 주민복지 및 소득증대에 기여

5. 국제 공인시험기관 운영 및 시험분야 확대

□ 국산 풍력발전기의 국내 보급 및 수출 촉진을 위한 국제 공인시험기관 운영 활성화 및 시험분야 확대

□ 전문성 및 기술력을 갖춘 국제적인 연구기관으로 성장하여 제주도의 풍력산업 발전을 위한 신성장 동력산업에 공헌

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2017. 12월

□ 사 업 비 : 1,000백만원(ʹ16년 예산 : 70백만원)

∙ (계획안) ʹ13년 500, ʹ14년 200, ʹ15년 130, ʹ16년 100, ʹ17년 70백만원

※ 국제공인시험기관 구축을 위한 5개년 계획수립 시(΄13년) 소요 예상비용   □ 주요내용

∙ 풍력발전기 출력성능 및 전력품질 측정분야 시험 수행

∙ 풍력발전기 기계하중 및 소음 측정분야 시험 확대

□ 추진상황

□ 산업부 산하 한국인정기구의 국제공인시험기관 최초 인정 : ΄15. 4월

∙ 풍력발전기 출력성능 및 전력품질 측정 시험분야

□ 기계하중 및 소음 측정 시험분야 확대를 위한 성능평가기술 개발

□ 이후 추진계획

□ 국제공인시험기관 정기 사후관리 평가 수검(한국인정기구) : ΄16. 3월

□ 기계하중 및 소음측정분야 확대 신청 및 문서심사·현장평가 수검 : ΄16. 5~12월

□ 기계하중 및 소음측정분야 인정 획득 : ΄17. 1월

□ 기대효과

□ 4개 시험분야에 대한 인정획득으로 풍력발전기 성능시험기관 체계 확립

□ 풍력발전기 성능시험, 단지평가, 이용률 개선, 기술컨설팅 등 수익사업 추진

6. 풍력발전단지 리파워링(Repowering) 사업

□ 김녕풍력 화재에 따른 풍력발전기(1호기) 철거로 대체 풍력발전기 설치 필요

□  소용량(kW급) 풍력발전기를 최신 기술이 적용된 대용량(MW급) 풍력발전기로 대체(리파워링)하여 효율향상 및 수익증대

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2016. 1 ~ 10월

□ 사 업 비 : 3,520백만원

□ 사업규모 : 2MW 내외

□ 추진상황

□ 발전사업허가 변경 신청 : ΄15. 12월

□ 김녕리 마을 사업설명회 실시 : ΄15. 12 ~ ΄16. 1월

∙ 김녕리 소유 부지 매입 및 임대

∙ 리파워링 사업 관련 마을 주민동의

□ 이후 추진계획

□ 기본 및 실시설계용역 착수 : ΄16. 3 ~ 9월

□⌜국토의 계획 및 이용에 관한 법률」등에 의한 인허가 신청 : ΄16. 3월

□ 발전기 제작 설치 및 부대공사 착공 : ΄16. 5월

□ 준공 및 상업운전 : ΄16. 10월

□ 기대효과

□ 발전소주변지역지원에 관한 규정에 따른 지원 등으로 주민 복지 및 소득증대 기여 : 일시지원금 60백만원, 기본지원금 매년 20백만원

□ 대형발전기 대체로 연간 전력생산량 2,738MWh 증가 및 약 5억원의 추가 수익 발생

7. 에너지복지 지원사업 추진

□ 도내 취약계층 대상의 전기요금 지원사업과 태양광 발전설비 설치비용 지원사업 추진하여 에너지복지 실현 및 청정에너지 확대 보급

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2016. 1 ~ 12월

□ 사 업 비 : 1,000백만원(취약계층 에너지지원 500, 태양광 설치비용 지원 500)

□ 사업규모

∙ 장애인 및 조손가정 약 2,700여 가구에 전기요금 지원

∙ 주택 300가구(3kW이하), 사회복지시설 20개소(10kW이하)에 설치비용 지원

※ 주택은 1가구 당 공사 100만원, 에너지공단 201만원 지원, 자부담 약 520만원,

사회복지시설은 1개소 당 공사 1,000만원, 에너지공단 1,100만원 지원

□ 추진상황

□ ʹ15년도 에너지 복지 지원사업 추진 결과

∙ 총 2,745가구에 470백만원 전기요금 지원(지급률 94.2%)

∙ 총 218가구에 440백만원 태양광 발전설비 설치비용 지원(지급률 87.2%)

□ 원활한 사업추진을 위한 상호업무 협약 체결 : ʹ16. 1월

∙ 전기요금 지원사업은 사회복지공동모금회+장애인총연합회+한국전력공사, 태양광 설치비용 지원사업은 사회복지협의회 및 한국에너지공단과 협약

□ 이후 추진계획

□ 취약계층 에너지 지원사업 추가 대상자 신청 접수 : ʹ16. 2월

□ 태양광 설치비용 지원사업 지원계획 공고 및 지원대상자 선정 : ʹ16. 2 ~ 10월

□ 기대효과

□ 체감할 수 있는 복지사업 추진으로 공사의 사회적 책임 이행

□ 태양광발전 시설 보급(약 1,100kW)으로 ‘탄소 없는 섬, 제주’실현에 기여

8. 신재생에너지홍보관 운영 활성화

□  방문객 대상 체험 프로그램 확대 및 대내외 홍보를 강화하여 신재생에너지홍보관 방문객 증대 및 운영 활성화

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2016. 1 ~ 12월

□ 사업규모 : 신재생에너지 교육 사업 및 주요시설물 유지보수

□ 사 업 비 : 156백만원

∙ 전시물 수리 87, 청소용역 42, 교육진행 27백만원

□ 이후 추진계획

□ 관람객 증대를 위한 다각적인 홍보 추진 : ʹ16. 2 ~ 12월

∙ 제주여행 관련 블로그, 카페, 공사 홈페이지 등 온라인 홍보 실시

∙ 도내 유명 관광지에 홍보물 비치, 도내 대규모 행사 홍보부스 운영

□ 도내 초등학교 연계 교육 프로그램 확대(연 7회) : ‘16. 3 ~ 12월

∙ 아시아기후변화센터, 에너지관리공단 등과 협력체계를 구축하여 기후변화체험, 신재생에너지 체험 등 내실있는 교육 프로그램 운영

□ 가족 방문객 대상 체험프로그램 ‘Eco Familly’월 1회 운영 : ‘16. 3 ~ 12월

□ 홍보영상물 외 지역주민을 위한 주말 영화상영 : ‘16. 4 ~ 12월

□ 공사 및 ‘카본 프리 아일랜드’정책 홍보 신설 등 전시물 보완 : ‘16. 1 ~ 12월

□ 기대효과

□ 청정에너지 이용에 대한 국민 이해도 증진

□ 온/오프라인 홍보를 강화하여 신재생에너지 대표 관광지로 자리매김

Ⅳ. 2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2016년 1월말 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	6	1	5
제주에너지공사	6	1	5

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 제주에너지공사 전문인력 역량강화 대책 마련	추진중
2	○ 풍력발전기 이용률 제고방안 강구	추진중
3	○ 에너지사업 다각화 방안 마련	추진중
4	○ 입찰참여에 따른 도내 중소기업 참여율 제고방안 강구	추진중
5	○ 사회적 공헌활동 확대	추진중
6	○ 풍력발전기 화재사고 원인 조사 철저 및 재발방지 대책 마련	완료

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 경영지원팀 (☎)720-7424 운영관리2팀 (☎)720-7471
1. 제주에너지공사 전문인력 역량강화 대책 마련 □ 제주에너지공사의 기술력 확보를 위하여 전문인력에 대한 교육･훈련 등 역량강화 대책 마련
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 전문교육 실시 현황 • 기 간 : ʹ15. 1 ~ 12월 / 교육기관 : 한국전기안전공사 외 15개 업체 • 교육이수 시간 및 교육참석자 총계 : 329시간/ 103명 • 교 육 명(교육기관) - BLADED를 이용한 풍력터빈시스템 하중해석 (제주대 풍력대학원) - 진동측정 및 진단교육 (SKF KOREA 부산지사) ※ 진동자격증 취득 (자격증 번호 15/04/10 7039K-13-01) - 전기안전관리기술교육 (한국전기기술인협회) - Vestas V42 training 교육(Danish Wind Power Academy) - 예방진단 시스템 운영교육((주)효성) - 소음진동분석 실무교육(B&K) - 블레이드 유지보수 교육(제주대학교) 등 □ 신재생에너지 관련 분야 전문교육(석사과정) 지원 •제주대학교 풍력대학원 석사과정 등록금을 지원하여 현재까지 1명이 석사학위 수여 및 3명이 교육 수료하였고 2명이 재학 중임 □ 동복·북촌단지 유지보수 강화를 위한 제작사 교육 실시 •하자보증기간 동안 제작사와 1:1 현장교육을 통해 모니터링, 유지보수 및 고장원인 분석 등 운영관리 기술력 이전 □ 향후계획 □ 유지보수분야 직원역량 강화를 위한 제작사 교육 계획 수립 : ‘16. 2월 □ 전문워크숍 및 세미나 : ‘16. 1월 ~ 11월
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 운연관리1팀 (☎)720-7481 운영관리2팀 (☎)720-7471
2. 풍력발전기 이용률 제고방안 강구 □ 제주에너지공사에서 운영하고 있는 풍력발전기의 이용률이 민간업체에 비하여 떨어지고 있어 이용률 제고방안 강구
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 이용률 향상을 위한 중장기 운영관리 계획 수립 • 제주에너지공사 중장기 발전전략을 바탕으로 계획 수립 • 단지별 연간 운영계획을 수립하여 유지보수 시행 • 발전시설 고장률 저감 대책 및 고장 발생 시 긴급대응 대책 마련 □ 운영관리 실적 • 고장률 저감을 위한 정기점검 실시 - 고장 수리 실적(1 ~ 8월) : 총 184건 실시 - 행원 및 신창, 가시리풍력발전단지 정기점검 실시(6 ~ 7월) - 신규 동복·북촌 풍력발전단지 500시간 점검 실시(11 ~ 12월) • 예비자재 확보 실적(1 ~ 8월) : 총 1,390여개 확보 - 행원(780여개), 신창(90여개), 김녕(120여개), 동복·북촌(400여개) • 각 풍력단지 운영실적 통계 분석으로 이용률 및 가동률 관리 □ 향후계획 □ 사전 예방점검, 정밀진단 등을 실시하여 설비 이용률 향상 □ 신속한 대응을 위한 풍력단지 기동반을 구성하여 고장정지 시간 단축 • 주말·휴일에 간단한 유지보수 가능 인력에 대해 고정 근무 실시
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 사업운영부 (☎)720-7451,7461,7471
3. 에너지사업 다각화 방안 마련 □ 제주에너지공사가 에너지 관련 공기업으로써 풍력에너지 사업에만 치중하고 있어, 태양광, 폐열 등 에너지 사업 다각화 노력 필요
처 리 결 과
□ 추진상황 ※ 신재생에너지 중 제주의 특성상 가장 사업성이 뛰어난 풍력사업을 중점사업으로 공공주도 풍력자원 개발 추진 중, 타 에너지원을 활용한 사업다각화도 적극 추진 □ 태양광 관련 사업 추진 • 행원 풍력발전단지 내 506㎾ 태양광시설을 상업용으로 전환 - ΄14년 68,488천원 및 ΄15년(10월까지) 53,359천원 수익 창출 • 한국에너지공단과 연계한 주택 태양광발전설비 보급사업 실시 - ‘14년 128가구(384㎾), ’15년 218가구(654㎾) 지원 완료 • 제주시 공공시설을 활용한 태양광발전사업 타당성 조사 : ΄15.10 ~ ΄16.2월 - ’16년 제주시 공공시설 및 유휴부지를 활용한 시범사업 약 500㎾ 추진 □ 바이오매스 발전 플랜트 건설사업 검토 • 성공적 사업 추진을 위한 ㈜제주반도체와 상호협력 업무협약 체결 : ΄15. 8월 - 사업 추진을 위한 건설후보지 선정 및 사업계획(안) 수립 중 □ 향후계획 □ 공공시설을 활용한 태양광발전사업 시범사업 추진 • 제주시와 공공시설 태양광발전사업 관련 업무협약 체결 : ΄16. 2월 • 태양광발전사업 실시설계 및 인허가 절차 진행 : ΄16. 3 ~ 5월 • 태양광발전소 착공 및 상업운전 : ΄16. 6 ~ 10월 □ 바이오매스 발전 플랜트 건설사업 추진 • 사업타당성 검토 및 사업 추진 : ΄16. 3 ~ 12월 □ 마을재정자립 소규모 풍력, 풍력 연계형 ESS 등 지역자원을 활용한 사업다각화 지속 검토 추진
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 경영지원팀 (☎)720-7423
4. 입찰참여에 따른 도내 중소기업 참여율 제고방안 강구 □ 입찰공고 시 대기업 중심의 참여 사례가 발생하고 있는데, 도내 중소기업 등의 참여기회를 높일 수 있는 방안 강구
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 공사 및 용역 발주 시 지역업체와 공동수급하는 경우 가점 부여 • 동복·북촌 풍력발전단지 관련 각종 공사에 대한 입찰에 있어 토목, 건축, 전기공사 등에 지역업체와 공동수급할 것을 조건으로 진행 • 입찰공고를 추진할 때 지역제한 및 지역가점 제도를 충분히 검토 및 활용하여 제주 기업들의 참여기회를 높일 수 있도록 추진 □ 중소기업청장이 고시로 지정한 물품의 경우 중소기업 및 지역제한으로 입찰 추진 ※ 풍력발전기 소방설비의 경우, 설치에 있어 보험 및 안전에 대한 기준을 강화를 위해 전국입찰 추진 □ 향후계획 □ 물품구매에 있어 지역제한 및 중소기업제한 확대 추진 □ 신재생에너지 분야 도내 중소기업들이 사업에 참여할 수 있도록 지역제한 입찰 등 참여방안 강구
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 전략기획팀 (☎)720-7480
5. 사회적 공헌활동 확대 □ 공기업으로써의 역할 강화를 위하여 소외된 계층에 대한 사회적 공헌활동 확대 필요
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 사회복지시설 등 지역사회 공헌 노력 추진 • 풍력발전단지 주변지역 마을지원금 : 매년 1,147백만원 • 사회복지시설 기부금, 관련행사 및 기타 지원 : 36백만원 - 도내 초등학교 신재생에너지 교육과정연계사업 진행 - 설, 추석맞이 도내 사회복지시설 쌀 기부 □ 전기요금 지원을 통해 에너지비용 부담을 완화하고 삶의 질을 향상시켜 취약계층을 위한 지속적인 사회공헌 실시 • ʹ15년도 에너지 지원결과 : 장애인·조손수급자 2,745가구 - 1, 2, 3, 4분기 지급완료(총 471,720천원, 94.2%) - 1분기 2,745가구 120백만원, 2분기 2,703가구 118백만원, 3분기 2,684가구 117백만원, 4분기 2,638가구 115백만원 ※ 잔여분은 2016년 사업으로 이월 예정 □ 향후계획 □ 수익확대에 따라 다양한 사회 환원 사업 확대 추진 □ 전기요금 지원가구 전력사용 데이터 분석을 통한 사업규모 (지원대상, 지원금액) 재설정
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 운영관리 1팀 (☎)720-7481
6. 풍력발전기 화재사고 원인 조사 철저 및 재발방지 대책 마련 □ 김녕풍력발전기 화재에 대하여 제품 결함의 문제가 의심되고 있으나 원인 파악도 제대로 되지 못한 상황으로, 철저한 원인 조사 및 재발방지 대책 마련
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 김녕 화재 후 조치사항 • 7. 7. 13시경 화재 발생 후 14시 40분 경 자연 소진 • 7. 8. 너셀 내부 조사 시도하였으나 주요부품 전소하여 확인 불가 • 7. 10. ~ 14. 너셀 주요부품(메인샤프트, 발전기) 분리 작업 □ 합동조사반 현장조사 실시 • 일 시 : 2015. 7. 15. 10시 ~ 12시(화재 발생 후 9일 경과) • 구 성 : 풍력 및 화재분야 전문가 7명 + 공사, 유니슨(참고인) ※ 제주대학교 기계공학과, 한국에너지기술연구원, 동부소방서 화재감식반, 한국전기안전공사 기술진단부, 제주지방경찰청 과학수사계 • 조사내용 - 화재원인 추정 및 정확한 원인 추정을 위한 정밀조사 실시 여부 - 2차적인 안전사고 예방을 위한 조치사항 및 화재원인 규명 ⇒ 조사결과 : 브레이크 시스템 불완전 작동으로 로터디스크와 캘리퍼 마찰에 의한 과열 □ 화재원인이 되는 고장이 발생하지 않도록 예방점검 철저히 시행 □ 화재가 발생하더라고 즉시 소화 가능하도록 자동소화장치 설치 완료(‘15. 9월) □ 향후계획 □ 정기점검 시 나셀 내 자동소화장치를 주기적으로 점검 □ 풍력발전기 전문 인력 추가 확보 및 전문교육을 통해 유지보수 역량을 강화하여 철저한 설비 관리
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )