2016. 7.

제주도립 김창열미술관 건립사업 추진현황

[문화정책과]

제주도립 김창열미술관 건립사업 추진현황

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업위치 : 제주시 한경면 저지리 저지문화예술인마을 문화지구 내

□ 사업규모 : 부지면적 9,800㎡(2,964평), R.C조, 지상 1층, 연면적 1,587㎡(480평)

□ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년(계속사업)

□ 총사업비 : 9,200백만원(국비 3,680 - 40%, 도비 5,520 - 60%)

□ 사업비 현황

(단위 : 백만원)

재 원 별	총 계	2014년	2015년	비 고
계	9,200	1,800	7,400	2016년 이월사업으로 준공
국 비	3,680	720	2,960
지방비	5,520	1,080	4,440

Ⅱ		그 동안 추진사항

□ 2013. 05월 : 작품 기증 민 ․ 관 협약(1957년 ~ 2013년작 200점 기증)

□ 2013. 10월 : 중앙 재정 투 ․ 융자심사(행정자치부)

□ 2013. 11월 : 공유재산관리계획 승인(도의회)

□ 2013. 12월 : 건축설계 전국 현상 공모로 당선작 결정

□ 2014. 04월 : 건축 실시설계 및 건축물 착공

□ 2015. 10월 : 김창열미술관 건축물 상량

□ 2016. 06월 : 미술관 주요시설 공사 마무리

□ 2016. 07월 : 9월 개관준비에 따른 내부 정비 등

Ⅲ		개관 준비사항

□ 2016. 07월 : 운영직제 구성(개방형 관장 공모, 홈페이지 구축 등)

□ 2016. 08월 : 제주도립 김창열미술관 공립미술관 등록 및 작품 설치

※ 전시환경 마무리, 기증작품 가치 평가 등(실 인수작품 220점)

□ 2016. 09월 : 제주도립미술관 관련 조례 개정(입장료 등)

□ 2016. 09. 24. : 제주도립 김창열미술관 개관 ․ 운영

Ⅳ		향후 운영계획

- 한국 현대미술 1세대 작가에 걸 맞는 세계화 지향 공립미술관 운영

※ 「물방울」 작품을 활용한 제주의 문화이색 공간 창출

- 개방형 전문과장 운영 환경으로 문화예술의 가치 창출

※ 도 문화정책과 직영 체계로 공립미술관의 서비스 및 질 향상 등 경쟁력 강화

- 저지 문화예술인 마을 활력화 협력 기반 강화

※ 다양한 문화예술 프로그램 운영, 국내외 미술관과의 전시교류 활성화 등

	김창열화백 Profile
❍ 평안남도 맹산 출신(1929년생, 현재 88세) ❍ 서울 대학교 미술대학 수학 후 프랑스 거주 활동(1969∼ ) ❍ 작품 주요 소장처(퐁피두 센터, 도쿄미술관, 보스톤 현대미술관, 국립현대, 리움 등) 6.25 전쟁 당시 1년 6개월 제주에 거주한 인연으로 물방울 작품 기증