제344회 제주특별자치도의회 임시회

농 수 축 경 제 위 원 회

2016. 7. 18(월) 14:00

현안 보고

LNG 인수기지 및 공급망 구축 추진상황

❚경제산업국❚

			목 차

□ LNG 인수기지 및 공급망 구축 추진상황

1. LNG 인수기지 추진 연혁

LNG 인수기지 및 공급망 구축 추진상황

❍ 정부의 제주지역 천연가스 공급계획에 따라 도민에게 청정하고 저렴한 연료 공급을 위한 LNG 인수기지를 건설

□ 사업개요

❍ (사업기간) 2010 ~2019. 8월

❍ (사업주체) 한국가스공사

❍ (소요예산) 5,609억원(인수기지 3,709, 공급배관 1,900)

❍ (사업내용) 부지매립(74,786㎡), 저장탱크(4.5만㎘×2기)

- 공급배관(80.7㎞) : 애월↔(삼양·한림발전소, 제주시·서귀포시 도시가스)

※ 항만개발 : 안벽 270m, 방파제 1,465m, 준설 및 매립 1식

□ 추진상황

❍ 2008. 08 정부, 제주지역 LNG 인수기지 건설 본격추진 발표

❍ 2009. 03 애월지역 주민(85%찬성) LNG 인수기지 유치발표 및 건의

❍ 2012. 03 애월항 2단계 개발 공사 착공

❍ 2015. 01 LNG 부지 조성공사 착공

❍ 2016. 01 공급배관 도시계획시설 입안 요청(주민설명회 : 5. 19)

□ 향후계획

❍ (부지매립) 2016. 12 매립완료 예정 → 현재 공정율(72.5%)

❍ (인수기지) 2016. 12 부지확보 후 → 착공(‘17.01), 완공(’19.08)

❍ (공급배관) 도시계획시설 결정(‘16.08)→실시설계(’16.09)→착공(‘16.10)

□ 기대효과

❍ 값싸고 청정한 LNG 공급으로 도민 연료비 절감

❍ 애월항을 제주의 에너지 및 물류중심 항만으로 육성

1		LNG 인수기지 추진 연혁

□ 추진배경

❍ 2008. 08 정부, 제주지역 LNG 인수기지 건설 본격추진 발표

❍ 2008. 12 정부, 제9차 장기천연가스수급계획 반영

❍ 2009. 03 애월지역 주민(85%찬성), LNG 인수기지 유치 발표 및 건의

❍ 2009. 07 애월항내 LNG 인수기지 안정성 검토용역 완료(한국가스공사)

❍ 2009. 07 LNG 인수기지 부지확정(애월항) 및 도↔한국가스공사 MOU체결

❍ 2010. 08 예비타당성 조사결과 통보(기획재정부)

❍ 2010. 10 애월항 2단계 개발사업 실시설계용역 착수(‘11.7 완료)

❍ 2010. 12 환경영향평가 용역 착수(‘11.12 완료)

❍ 2011. 09 애월항 항만공사 실시계획 공고

❍ 2012. 03 애월항 2단계 개발공사 착공

❍ 2012. 10 LNG 인수기지 매립공사 시행을 위한 협약체결(도↔한국가스공사)

❍ 2013. 04 ~ 10 LNG 인수기지 매립공사 기본 및 실시설계용역

❍ 2013. 04 제11차 장기천연가스 수급계획 결과 발표

❍ 2013. 09 LNG 발전소 건설 건의문 제출

❍ 2014. 01 제주 LNG 발전소 건설 확정

❍ 2015. 12 제주 천연가스공급 주배관 건설관련 도시관리 입안계획 수립

❍ 2015. 12 제12차 장기 천연가스 수급계획 결과 발표

- 발전용 수요증가 및 애월기지 부지매립 지연 등을 고려하여 주배관 시설규모 변경(연장 55㎞→81㎞) 및 준공시기 연기(‘17년→’19년)

❍ 2016. 01 LNG 공급배관 도시계획시설 입안 요청

❍ 2016. 02 LNG 공급배관 전략 환경영향평가 평가준비서 제출

❍ 2016. 04 LNG 발전소 개발사업 승인

❍ 2016. 05 LNG 발전소 공사계획인가 및 건축허가

❍ 2016. 05 공급배관 공사 관련 주민설명회(농어업인회관)

❍ 2016. 06 LNG 0발전소 공사착공

❍ 2016. 07 LNG 인수기지 주민설명회