제345회 제주특별자치도의회 임시회

농 수 축 경 제 위 원 회

2016. 9.

주 요 업 무 보 고

순   서

Ⅰ. 일반현황

Ⅱ. 비전과 목표

Ⅲ. 2016년 주요업무계획

□ 공공주도 풍력자원 개발사업 추진

□ 동복·북촌 풍력발전단지 2단계 조성사업

□ 풍력발전 연계형 ESS 제안공모 사업

□ 공공시설 건축물 활용 태양광발전 시범사업

□ 에너지 연구기술개발 사업

□ 태양광 발전 보급 지원사업

□ 취약계층 전기요금 지원사업

Ⅳ. 2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

1		기구 및 정·현원

□ 기    구 : 2부 1센터 5팀

															사 장
	이 사 회																										감사(비상임)
	경영관리부														사업운영부												에너지연구기술센터
전략 기획팀								경영 지원팀						사업 개발팀						운영 관리1팀						운영 관리2팀

※ 공사설립일 : 2012. 7. 4.

□ 정․현원

(단위 : 명)

구 분	계	사 장	1~2급	3급	4급	5급	6급	계약직
정 원	42	1	1	2	7	15	11	5
현 원	34	1	1	0	3	13	11	5

※ `16년 하반기 7명 채용 공고 예정 / 제주특별자치도 파견 1명, 인턴 5명 별도

2		부서별 주요업무

부 서		주 요 분 장 사 무
경영관리부	전 략 기획팀	❍ 장․단기 경영전략 및 경영계획 수립 추진 ❍ 조직 및 정원관리, 규정 제․개정, 감사업무 ❍ 예산편성, 자금운용계획 수립 및 수입관리 업무 ❍ 내․외부 평가, 성과관리 ❍ 홍보․대외협력 업무 ❍ 이사회 운영
	경 영 지원팀	❍ 기업회계 결산, 세무업무 ❍ 지출 및 회계, 재산․물품 관리 ❍ 공사․용역․물품 구매/계약 ❍ 인사/노무 및 교육훈련, 급여․복리후생 지원 ❍ 정보화 시스템 구축·운영
사업운영부	사 업 개발팀	❍ 육·해상풍력 등 신재생에너지 신규사업 추진 ❍ 사업 확대를 위한 대내·외 협력 사업 ❍ 발전단지 주변지역 지원사업 추진 ❍ 신재생에너지공급인증서(REC) 관리 및 판매
	운영관리 1팀	❍ 각 풍력발전단지 운영계획 수립 및 효율적 운영 ❍ 풍력발전기 이용률, 가동률 관리로 수익 극대화 ❍ 기술력 축적을 통한 고장조치 신속화
	운영관리 2팀	❍ 동복·북촌 풍력발전단지 운영계획 수립 및 효율적 운영 ❍ 동복·북촌 풍력발전기 출력성능 관리 ❍ 154kV 변전실 운영관리 ❍ 바이오매스 발전 플랜트 건설사업 추진
에너지연구 기술센터		❍ 풍력발전시스템 성능평가 및 성능보증시험 수탁 ❍ 공인시험기관 운영 및 시험분야 확대 ❍ 풍력발전시스템 성능시험 기술개발 ❍ 풍력자원 조사 및 형식시험장 구축 ❍ 신재생에너지관련 기술개발 및 연구과제 수행

3		재정운용 현황

□ 예산규모 : 25,158백만원

(단위 : 백만원)

수 입			지 출
사업수입	풍력발전전력판매	16,984	사업비용	영업비용	9,853
				영업외비용	1,206
	태양광전력판매	63
				법 인 세	300
				예 비 비	100
	공급인증서판매	5,727
			자본지출	투자자산	114
	이자수입	46
				유형자산	8,696
	기타영업외수익	207
				무형자산	75
자본수입	기타유동부채수입	131		유동부채상환금	131
				비유동부채상환금	4,479
이월금	순세계잉여금	2,000
				예 비 비	204
합 계		25,158	합 계		25,158

□ 재무상태

(단위 : 억원, %)

연도별	재무구조			부채 중 차입액 (차입부채)	당기순손익	부채비율 (A/B, %)
	자산	부채(A)	자본(B)
2013년	726.69	36.67	690.02	0	24.56	5.2
2014년	914.61	196.45	718.16	163.00	28.14	27.4
2015년	1,297.66	571.38	726.28	550.00	8.11	78.7

□ 자본금 : 663억원(제주특별자치도 현물출자 100%)

구 분	출자기관	납 입	위 치	규 모 (MW)	출자용도	출자유형	출자금액 (백만원)
΄12.7.4	제주특별자치도	설립 자본금	행원, 신창	12.25	전력생산	현물출자	8,063
΄12.11.23	제주특별자치도	증자	김녕, 가시리	16.5	전력생산	현물출자	58,262
합 계				28.75			66,325

4		주요시설 현황

□ 신재생에너지 시설

구 분	지 역	수 량		규 모
풍 력 발 전 · 태양광 발 전	행 원	12기	660㎾×5기(΄01년,΄03년)	11,450㎾
			750㎾×4기(΄00년,΄02년)
			1,500㎾×1기, 2,000㎾×1기(΄12년)
			1,650㎾×1기 (΄13년)
	신 창	2기	850㎾×2기(΄06년)	1,700㎾
	김 녕	1기	750㎾×1기(΄10년)	750㎾
	가 시 리	13기	1,500㎾×7기(΄12년)	15,000㎾
			750㎾×6기(΄12년)
	동복․북촌	15기	2,000㎾×15기(΄15년)	30,000㎾
	태 양 광(행원)	1식		506㎾
	합 계	풍력발전기 43기, 태양광 1식		59,406㎾
송전선로	행원 ~ 성산변전소	1식		24.5㎞
	가시리 ~ 표선변전소	1식		6.15㎞
	동복 ~ 조천변전소	1식		1.77㎞
	합 계	3식		32.42㎞

□ 신재생에너지홍보관

∙ 위    치  : 제주시 구좌읍 해맞이해안로 712-3 일원

∙ 사  업  비 : 70억원(국비 36억원, 지방비 24억원, 기금 10억원)

∙ 건설기간 : ΄08. 1 ~ ΄10. 5월

∙ 규    모  : 1,719㎡(연면적 2,467㎡,지상 2층)/대지면적 25,306㎡

∙ 주요시설 : 신재생에너지 전시·홍보시설, 체험교육공간, 4D영상관, 야외광장 등

∙ 주요기능 : 체험중심의 신재생에너지 교육·홍보를 통한 이해도 및 사회수용성 증진

∙ 연도별 이용현황

연 도	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	비 고
관람인원(명)	31,692	31,851	35,076	35,980	30,547

비 전 과  목 표

1		2022 비전 및 목표, 실천전략

미 션		지역에너지 자원을 활용하여 제주의 미래를 이끈다

비 전		‘탄소 없는 섬, 제주’를 선도하는 최고의 창조적 공기업

2022 목 표		육상풍력 210MW 해상풍력 702MW	이용률 육상 25%, 해상 35%	KoBEX AAA 공기업경영평가 1위

가치

준거

핵심가치

경영방침

인재 존중	도전 정신	창의 혁신	사회 공헌

공익적 창의성 우선	실질적 성과지향	사규에 의한 공정한 관리	소통과 화합

실천전략		실천과제
풍력사업의 안정적 추진		❍ 육상풍력단지 지속 확장 ❍ 해상풍력사업 추진 ❍ 발전단지의 능률적 운영
미래 성장기반 확보		❍ 신재생에너지사업의 다각화 ❍ 성장동력 기술 확보 ❍ 상생 협력사업 활성화
공사 경쟁력 확보를 위한 핵심역량 강화		❍ 인사/조직체계 고도화 ❍ 인적자원 역량 향상 ❍ 재무관리 강화
지속가능 경영체계 구축		❍ 대외인지도 제고 ❍ 선진 윤리경영체계 확립 ❍ 사회적 기여도 제고

2016년 주요업무계획

1. 공공주도 풍력자원 개발사업 추진

❍ 풍력자원의 공공적 관리와 공익적 가치 향상으로 주민수용성을 제고하여 풍력발전사업의 원활한 추진 도모

❍ ‘탄소 없는 섬, 제주’ 실현 및 에너지 자립기반 조성

□ 사업개요

□ 사업기간 : `15. 9. 25. ~ `22. 12. 31.

□ 사 업 비 : `16년 5,500백만원(기본설계 및 환경영향평가 용역비)

□ 사업규모 : 육상 151㎿(동복·북촌 2단계 24㎿포함), 해상 702㎿

□ 추진방법

∙ 육상풍력은 공사 또는 향토기업이 참여하여 지역공동체 재정자립 지원사업으로 추진

∙ 해상풍력은 공사 직접투자 또는 투자자 유치공모를 통해 최대 이익공유화 제안업체 선정 추진

□ 추진상황

□ 풍력발전지구 지정 후보지 공모로 후보지 선정 : `16. 1. 29.

∙ 육상 1개 : 행원 / 해상 3개 : 평대·한동, 표선·세화2·하천, 월정·행원

□ 지구지정 계획(안) 및 주민열람공고 조치계획 제출 : `16. 3 ~ 5월

□ 풍력발전사업심의위원회 한동·평대 해상풍력 지구지정 심의 : `16. 7. 26.

□ 향후 추진계획

□ 1차 후보지 대상 풍력발전단지 지구지정 절차 이행

※ 지구지정 후 투자자를 유치, 개발사업 관련 인·허가 공동 진행

□ 공공주도 풍력개발 지속 확대 : `17년도 서부지구 후보지 공모 추진

□ 기대효과

□ 풍력발전수익의 도민 수익전환으로 지역주민 복지증진 및 소득증대 기여

□ 풍력발전사업 활성화에 따른 새로운 성장기반 마련으로 지역경제 활성화 기여

2. 동복·북촌 풍력발전단지 2단계 조성사업

❍ 동복·북촌 풍력발전단지 준공 후 24㎿규모의 2단계 사업을 추진하여 도내 최대 규모인 54㎿ 풍력발전단지 조성

❍ 기존단지의 기반시설을 공유함으로써 비용을 절감하고 민원을 최소화하여 사업 추진

□ 사업개요

□ 사업기간 : `15. 1 ~ `17. 12월

□ 사 업 비 : 59,100백만원(`16년 1,940, `17년 57,160백만원)

□ 사업규모 : 24㎿(2㎿ × 12기 또는 3㎿ × 8기)

□ 사업위치 : 제주시 구좌읍 동복리 산56번지 일원(약 900,000㎡)

□ 추진상황

□ 사업타당성 조사 실시(지방공기업평가원) : `15. 5 ~ 8월

∙ 조사결과 투자 타당성 확보 : 내부수익률 9.03%, B/C ratio 1.15

□ 도의회 신규 투자사업 타당성 검토(재원조달 방안) 심의 : `15. 9. 14.

□ 행정자치부 지방공사채 발행 승인 완료 : `15. 11. 24.

□ 동복리 마을설명회 및 개발위원회 개최 등 주민의견 수렴 : `16. 4월

□ 향후 추진계획

□ 동복리 마을총회 주민동의 후 실시설계 용역 발주, 풍력발전단지 지구지정 및 인허가 절차 이행

□ 공사 착공 : `17년 / 공사 준공 및 상업운전 개시 : `18년

□ 기대효과

□ 연간 49,628㎿h 전력생산으로 연간 100억원이상의 수익 창출 및 청정에너지 확보

3. 풍력발전 연계형 ESS 제안공모 사업

❍ 정부 신재생에너지 육성 전략에 대응한 에너지저장장치(ESS) 사업 추진으로 신재생에너지 사업 확대 및 ‘탄소 없는 섬, 제주’ 실현

□ 사업개요

□ 사업기간 : `16. 6 ~ 12월

※ `16년내 구축 완료하여 REC 5.0 가중치 확보

□ 사업내용 : 민간 투자를 유치하여 REC 수익 공유

∙ (공사) 풍력사업자 : 발전단지 제공, 인·허가 지원, 전력거래

∙ (민간) ESS 사업자 : ESS 책임 투자·구축·운영

※ 사업자가 발전단지별 최적 사업규모 제안 및 투자비 확보

□ 추진상황

□ ESS 설치 제안 공모 사업 계획 수립 : `16. 6월

□ 제안공모 공고 : `16. 6. 30. ~ 7. 22. / 사업설명회 개최 : `16. 7. 6.

□ 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정 : `16. 7. 27.

□ 향후 추진계획

□ 계약체결 및 인·허가 신청 : `16. 8월

□ 공사 착공 및 준공 : `16. 9 ~ 12월

□ 기대효과

□ 풍력발전 출력제어로 제주 전력계통 안정화 기여

□ 15년간 약 107,800REC 추가 발생으로 약 107억원 수익 기대

4. 공공시설 건축물 활용 태양광발전 시범사업

❍ 제주시 공공시설 및 유휴부지를 활용한 태양광 발전사업 추진

❍ 사업다각화를 통한 신재생에너지 보급 확대와 ‘탄소 없는 섬, 제주’ 실현에 기여

□ 사업개요

□ 사업기간 : `16. 3 ~ 12월

□ 사 업 비 : 1,250백만원

□ 사업규모 : 태양광 발전 500㎾ 내외

□ 사업위치 : 제주종합경기장 내 체육시설 및 주차장

□ 추진상황

□ 제주시(체육진흥과)와 시범사업 협약 체결 : `16. 6월

□ 기본 및 실시설계 용역 : `16. 4 ~ 8월

□ 전기사업허가 완료 : `16. 7월

□ 태양광발전시설 제작·설치 착수 : `16. 7 ~ 12월

□ 개발행위허가 완료 : `16. 8월

□ 향후 추진계획

□ 사용전검사 실시 : `16. 10월 / 준공 및 상업운전 : `16. 11월

□ 기대효과

□ 연간 약 657㎿h의 전력을 생산하고 온실가스배출 305톤 저감 효과

□ 제주시 세입증대 기여 : 태양광발전 매출액의 5% 배분 예정

5. 에너지 연구기술개발 사업

❍ 국산 풍력발전기의 국내 보급 및 수출 촉진을 위한 국제 공인시험기관 운영 활성화 및 시험분야 확대

❍ 전문성 및 기술력을 갖춘 국제적인 연구기관으로 성장하여 제주도의 풍력산업 발전을 위한 신성장 동력산업에 공헌

□ 사업개요

□ 사업기간 : `13. 1 ~ `17. 12월

□ 사 업 비 : 1,000백만원(`16년 예산 70백만원)

□ 추진방법

∙ 풍력발전기 기계하중·소음측정 시험분야 국제공인시험기관 인정 확대

∙ 도내·외 풍력터빈 성능보증시험 및 연구과제 수행

□ 추진상황

□ 국내 최초 출력성능·전력품질 분야 국제공인시험기관 인정 : `15. 4월

□ `16년 도내·외 풍력터빈 성능보증시험 3건 수주(도내2건, 도외1건)

∙ 제주 김녕풍력발전단지 7호기 성능보증 시험 : `15. 8 ~ `16. 9월

∙ 제주 김녕풍력발전단지 전체 가동률 산정용역 : `16. 7 ~ 9월

∙ 전남 서거차도 100㎾ 풍력터빈 성능보증시험 : `16. 3 ~ 11월

□ 나셀 라이다 이용 출력성능 측정 기술개발 공동연구 수행(제주대, 제주에너지공사 외 3개 기관 참여) : `16. 5 ~ `18. 12월

□ 2단계 기계하중·소음측정 시험분야 인정확대 신청 : `16. 7월

□ 제주도청 학술연구용역 2건(마이크로그리드 타당성 연구용역, 풍력발전 실증단지 개발사업 타당성 검토용역) 계약체결 및 수행 : `16. 8 ~ 12월

□ 향후 추진계획

□ 문서심사 및 현장평가, 지적사항 시정조치 수행 : `16. 8 ~ `17. 2월

□ 국내 최초 기계하중·소음측정(2단계) 시험기관 인정 : `17. 3월

□ 국제 성능시험기관 협의체(MEASNET) 가입 추진 : `18년

6. 태양광 발전 보급 지원사업

❍ 도민의 에너지 복지 실현을 위하여 주택과 사회복지시설에 태양광발전설비 설치비용 지원

❍ 한국에너지공단 신재생에너지 보급 지원사업과 연계하여 정부 보조금 외 도민에게 추가 보조금 지급

□ 사업개요

□ 사업기간 : `16. 1 ~ 12월

□ 사 업 비 : 500백만원

□ 사업규모 : 주택 300가구(3㎾ 이하), 사회복지시설 20개소(10㎾이하)

※ 주택 : 1가구 당 공사 100만원, 에너지공단 201만원 지원
시설 : 1개소 당 공사 1,000만원, 에너지공단 1,100만원 지원

□ 추진상황

□ `15년도 사업 추진 결과 : 총 218가구에 440백만원 지원

□ 원활한 `16년도 사업추진을 위한 업무협약(공사-사회복지협의회, 공사-한국에너지공단) 체결 : `16. 1월

□ `16년도 현재까지 주택 78가구(174㎾)에 약 77백만원 지급 완료

∙ 신청현황 : 주택 약 200가구, 사회복지시설 약 16개소

□ 향후 추진계획

□ 태양광 설치비용 지원사업 접수 및 보조금 지원 : ~ `16. 12월

7. 취약계층 전기요금 지원사업

❍ 도내 취약계층 중 장애인 및 조손가정에 전기요금을 지원함으로써 경제적 부담을 저감시키고 에너지 복지 실현

□ 사업개요

□ 사업기간 : `16. 2 ~ `17. 1월

□ 사업대상 : 장애인·조손 수급자 3,285명

□ 사 업 비 : 539백만원(`15년도 이월예산 39백만원)

□ 지원방법 : 연 4회 분기별 온라인 계좌 입금(가구당 평균 45천원)

□ 추진상황

□ `14년 ~ `15년 총 5,451가구에 960백만원 지원 완료

□ `16년도 지원사업을 위한 4개 기관 업무협약 체결 : `16. 1월

∙ 공사, 제주 사회복지공동모금회, 한국전력공사 제주지부, 제주 장애인총연합회

□ `16년 1분기 지원금 134백만원(3,285가구) 지원 : `16. 6월

□ 추가 지원대상자 모집 및 사업 점검을 위한 간담회 실시 : `16. 8월

□ 향후 추진계획

□ 분기별 지원금 지급 예정 : 8월, 10월, `17. 1월

□ 지원사업 마무리 및 `17년도 사업을 위한 협의 : `16. 12월

□ 기대효과

□ 체감할 수 있는 복지사업 추진으로 공사의 사회적 책임 이행

□ 전기요금 지원을 통하여 3,300여 취약계층 가구의 동·하계 경제적 부담 절감

2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2016년 7월말 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	6	4	2	-
제주에너지공사	6	4	2	-

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 제주에너지공사 전문인력 역량강화 대책 마련	완 결
2	○ 풍력발전기 이용률 제고방안 강구	완 결
3	○ 에너지사업 다각화 방안 마련	추진중
4	○ 입찰참여에 따른 도내 중소기업 참여율 제고방안 강구	완 결
5	○ 사회적 공헌활동 확대	추진중
6	○ 풍력발전기 화재사고 원인 조사 철저 및 재발방지 대책 마련	완 결

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 경영지원팀 (☎)720-7425 운영관리1,2팀 (☎)720-7461, 7471 연구기술센터 (☎)720-7431
1. 제주에너지공사 전문인력 역량강화 대책 마련 □ 제주에너지공사의 기술력 확보를 위하여 전문인력에 대한 교육･훈련 등 역량강화 대책 마련
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 유지보수분야 직원역량 강화를 위한 제작사 교육 계획 수립 : ‘16. 2월 □ 전문워크숍 및 세미나 : ‘16. 1 ~ 11월 □ 전문교육 실시 현황 ∙ 기 간 : ʹ16. 1 ~ 7월 / 교육기관 : (주)한진산업 외 7개 업체 ∙ 교육이수 시간 및 교육참석자 총계 : 189시간/ 64명 ∙ 교 육 명(교육기관) - 동복풍력발전단지 풍력발전설비 2016년 상반기 교육((주)한진산업) - 계통운전반 교육(전력거래소 제주지사) - 풍력발전용 전기 회로 이해 및 활용 교육(제주대학교 산학협력단) - 제주에너지산업 패러다임 변화와 대응 교육(블루이코노미 전략연구원) - 풍력터빈 상태감시 모니터링 및 사고원인 분석 세미나(로맥스) - 국제공인시험기관 운영을 위한 KS Q ISO/IEC 17025 교육(한국시험인증산업협회) - 전기안전관리기술교육 (한국전기기술인협회) - 유지보수 자체 세미나(사내 교육) / 외국인 직원으로부터 기술 이전 □ 신재생에너지 관련 분야 전문교육(석사과정) 지원 ∙ 제주대 풍력대학원 석사과정 등록금 지원 : 석사취득 2명, 수료 4명, 재학 1명 □ 동복·북촌단지 유지보수 강화를 위한 제작사 교육 실시 ∙ 하자보증기간 동안 제작사와 1:1 현장교육을 통해 모니터링, 유지보수 및 고장원인 분석 등 운영관리 기술력 이전 □ ‘15년 전문교육 실시 현황 ∙ 교육이수 시간 및 교육참석자 총계 : 329시간/ 103명 □ 추진계획 □ 동복·북촌 풍력발전단지 풍력발전설비 ‘16년 하반기 교육 : ‘16. 12월 □ 154kV 전기설비(TR, GIS) 운영교육 : ‘16. 9월
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 운영관리1팀 (☎)720-7461

운영관리2팀 (☎)720-7471

2. 풍력발전기 이용률 제고방안 강구

□ 제주에너지공사에서 운영하고 있는 풍력발전기의 이용률이 민간업체에 비하여 떨어지고 있어 이용률 제고방안 강구

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 이용률 향상을 위한 중장기 운영관리 계획 수립

∙ 제주에너지공사 중장기 발전전략을 바탕으로 계획 수립

∙ 단지별 연간 운영계획을 수립하여 유지보수 시행

∙ 발전시설 고장률 저감 대책 및 고장 발생 시 긴급대응 대책 마련

□ 운영관리 실적

∙ 고장률 저감을 위한 정기점검 실시

- 동복·북촌풍력발전단지 고장 수리 실적(‘16. 1 ~ 7월) : 총 31건 실시

- 동복·북촌풍력발전단지 1년 정기점검 실시(‘16. 5 ~ 7월)

- 행원, 신창, 김녕, 가시리 단지 6개월 정기점검 실시(‘16. 3 ~ 8월)

∙ 예비자재 확보 실적(‘16. 1 ~ 8월) : 총 600여개 확보

- 행원 500여개, 신창 20여개, 김녕 20여개, 가시리 50여개

∙ 각 풍력단지 가동률 관리를 통한 이용률 제고 방안 강구

<단지별 가동률 현황>

구 분	행 원	김 녕	신 창	가시리	동복·북촌
`15년(1~12월)	86.7%	77.3%	74.9%	96.5%	-
`16년(1~7월)	81.8%	81.6%	95.2%	94.0%	98.19%

□ 향후계획

□ 사전 예방점검, 정밀진단 등을 체계적으로 실시하여 이용률 향상

□ 주말·휴일 기동반을 통한 발전단지 모니터링 강화 및 실시간 대응

처리상황

완결 (  ○  ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 사업운영부 (☎)720-7451,7461,7471
3. 에너지사업 다각화 방안 마련 □ 제주에너지공사가 에너지 관련 공기업으로써 풍력에너지 사업에만 치중하고 있어, 태양광, 폐열 등 에너지 사업 다각화 노력 필요
처 리 결 과
□ 추진상황 ※ 신재생에너지 중 제주의 특성상 가장 사업성이 뛰어난 풍력사업을 중점사업으로 공공주도 풍력자원 개발 추진 중, 타 에너지원을 활용한 사업다각화도 적극 추진 □ 한국에너지공단과 연계한 태양광발전설비 보급 지원사업 시행 중 ∙ ‘16년 주택 300가구(3kW이하) 3억원, 사회복지시설 20개소(10kW이하) 2억원 지원 □ 제주시 공공시설을 활용한 태양광발전사업 실시설계 : ΄16. 4 ~ 8월 ∙ ‘16년 제주종합경기장에 시범사업으로 약 500㎾ 추진 □ 풍력발전 연계형 에너지저장장치(ESS) 제안공모 사업 추진 ∙ 민간투자(사업규모 제안 및 투자비 확보)를 유치하여 REC 수익 공유 ∙ 제안공모를 통한 우선협상 대상자 선정 : ΄16. 7월 - 동복․북촌 및 가시리 풍력단지에 총 PCS 9㎿ / 배터리 27㎿h 제안 □ 바이오매스 발전 플랜트 건설사업 검토 ∙ 성공적 사업 추진을 위한 ㈜제주반도체와 상호협력 업무협약 체결 : ΄15. 8월 - 사업 추진을 위한 건설후보지 선정 및 사업계획(안) 검토 □ 향후계획 □ 공공시설을 활용한 태양광발전사업 시범사업 추진 ∙ 태양광발전소 준공 및 상업운전 : ΄16. 11월 □ 풍력발전 연계형 ESS 설치 ∙ 계약체결 및 인허가 신청 : ΄16. 8월 ∙ 공사 착공 및 준공 : ΄16. 9 ~ 12월 □ 바이오매스 발전 플랜트 건설사업 추진 ∙ 자체 사업타당성조사 및 경제성 확보방안 검토 후에 추진 □ 마을재정자립 소규모 풍력 등 지역자원을 활용한 사업다각화 지속 검토 추진
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 경영지원팀 (☎)720-7423
4. 입찰참여에 따른 도내 중소기업 참여율 제고방안 강구 □ 입찰공고 시 대기업 중심의 참여 사례가 발생하고 있는데, 도내 중소기업 등의 참여기회를 높일 수 있는 방안 강구
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 공사 및 용역 발주 시 지역업체와 공동수급하는 경우 가점 부여 ∙ 각종 공사 및 용역에 대한 입찰에 있어 지역업체와 공동수급 할 것을 조건으로 진행 ∙ 도내 업체와 공동수급체를 구성하지 않고 입찰에 참여 할 경우, 입찰참가 자격이 제한되도록 추진 ∙ 입찰공고를 추진할 때 지역제한 및 지역가점 제도를 충분히 검토 및 활용하여 제주 기업들의 참여기회를 높일 수 있도록 추진 □ 중소기업청장이 고시로 지정한 물품의 경우 중소기업 및 지역제한으로 입찰 추진 ※ 풍력발전기 소방설비의 경우, 설치에 있어 보험 및 안전에 대한 기준 강화를 위해 전국입찰 추진 □ 향후계획 □ 물품구매에 있어 지역제한 및 중소기업제한 확대 추진 □ 신재생에너지 분야 도내 중소기업들이 사업에 참여할 수 있도록 지역제한 입찰 등 참여방안 강구
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 전략기획팀 (☎)720-7484
5. 사회적 공헌활동 확대 □ 공기업으로써의 역할 강화를 위하여 소외된 계층에 대한 사회적 공헌활동 확대 필요
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 사회복지시설 등 지역사회 공헌 노력 추진 ∙ 풍력발전단지 주변지역 마을지원금 : 매년 1,147백만원 ∙ 사회복지시설 기부금, 관련행사 및 기타 지원 - 도내 초등학교 신재생에너지 교육과정연계사업 진행 : 12백만원 - 설 맞이 도내 사회복지시설 쌀 기부 : 3백만원 - 기타 기부 활동 : 16백만원 □ 전기요금 지원을 통해 에너지비용 부담을 완화하고 삶의 질을 향상시켜 취약계층을 위한 지속적인 사회공헌 실시 ∙ ʹ16년 1분기 지원결과 : 장애인·조손수급자 3,285가구(134,508천원) ∙ ʹ15년도 에너지 지원결과 : 장애인·조손수급자 2,745가구(471,720천원) □ 제주에너지공사, 제주관광공사 합동 환경정화활동 실시 : ‘16. 7. 8. □ 향후계획 □ 전기요금 지원가구 전력사용 데이터 분석을 통한 사업규모 (지원대상, 지원금액) 재설정 □ 제2차 제주에너지공사, 제주관광공사 합동 환경정화활동 실시 : ‘16. 10월 예정
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 운영관리1팀 (☎)720-7461 운영관리2팀 (☎)720-7471
6. 풍력발전기 화재사고 원인 조사 철저 및 재발방지 대책 마련 □ 김녕풍력발전기 화재에 대하여 제품 결함의 문제가 의심되고 있으나 원인 파악도 제대로 되지 못한 상황으로, 철저한 원인 조사 및 재발방지 대책 마련
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 김녕 화재 후 조치사항 ∙ 7. 7. 13시경 화재 발생 후 14시 40분 경 자연 소진 ∙ 7. 8. 너셀 내부 조사 시도하였으나 주요부품 전소하여 확인 불가 ∙ 7. 10. ~ 14. 너셀 주요부품(메인샤프트, 발전기) 분리 작업 □ 합동조사반 현장조사 실시 ∙ 일 시 : ‘15. 7. 15. 10시 ~ 12시(화재 발생 후 9일 경과) ∙ 구 성 : 풍력 및 화재분야 전문가 7명 + 공사, 유니슨(참고인) ※ 제주대학교 기계공학과, 한국에너지기술연구원, 동부소방서 화재감식반, 한국전기안전공사 기술진단부, 제주지방경찰청 과학수사계 ∙ 조사내용 - 화재원인 추정 및 정확한 원인 추정을 위한 정밀조사 실시 여부 - 2차적인 안전사고 예방을 위한 조치사항 및 화재원인 규명 ⇒ 조사결과 : 브레이크 시스템 불완전 작동으로 로터디스크와 캘리퍼 마찰에 의한 과열 □ 화재원인이 되는 고장이 발생하지 않도록 예방점검 철저히 시행 □ 화재가 발생하더라도 즉시 소화 가능하도록 자동소화장치 설치 완료(‘15. 9월) □ 향후계획 □ 정기점검 시 나셀 내 자동소화장치를 주기적으로 점검 □ 풍력발전기 전문 인력 추가 확보 및 전문교육을 통해 유지보수 역량을 강화하여 철저한 설비 관리
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )