2018년도 공유재산관리계획 변경(안)

〔종달초등학교 다목적강당 및 유치원 증축〕

의안 번호	281		제출일자 : 2018년 11월 일 제 출 자 : 제주특별자치도교육감

1. 제안이유

❍ 당초 2018년 제1회 추경예산에 편성된 특별교실, 다목적실 및 유치원 증축사업을 다목적강당 및 급식실, 유치원 별동 증축으로 사업계획을 변경하여 추진하고자

❍ 「공유재산 및 물품관리법」 제10조 및 같은 법 시행령 제7조, 「제주특별자치도교육감 소관 공유재산관리 조례」제13조 제1항의 규정에 따라 공유재산관리계획변경(안)에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

❍ 소 재 지: 제주시 구좌읍 종달로7길 5

❍ 건축연면적: 1,725㎡(당초 1,530㎡)

❍ 사업기간: 2018년 8월~2020년 12월(당초 2018년8월~2019년6월)

【설계: 2019년 1월 ~ 2019년 8월】

❍ 사 업 비: 5,155,210천원(당초 3,654,210천원)

❍ 주요시설: 1층 급식실 및 특별교실, 2층 다목적강당, 유치원 별동 1동

(당초 1층 특별교실 및 유치원, 2층 다목적실)

3. 공유재산관리계획서: 붙임과 같음

4. 참고자료

❍ 사 업 계 획 서: 붙임과 같음

❍ 위치도 및 사진: 붙임과 같음

공 유 재 산 관 리 계 획 서

제주특별자치도교육청

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

재산 구분	취 득								처 분								비고
	계		매 입		교 환		기 타		계		매 각		교 환		양 여
	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액
1.토 지
2.건 물	1,725	5,155,210					1,725	5,155,210
3.공작물
4.입목죽
5.기계기구
6.기 타
총계	1,725	5,155,210					1,725	5,155,210

취득대상 재산 목록

(단위:㎡,천원)

일련 번호	재산의 구 분	재 산 의 표 시			추정가액	취득시기	취득사유	취득대상재산 소유자 주소, 성명	비고
		소 재 지	지목 및 구조	면적
1	건물	제주시 구좌읍 종달로7길 5	철근콘크리트	1,725	5,155,210	2020년 하반기	다목적강당, 급식실, 특별교실, 유치원 증축	제주특별자치도교육감

종달초등학교 다목적강당 및 유치원 증축사업

학생들의 다양한 교육과정과 효율적인 시설활용을 위해 2018년 제1회 추경예산에 편성된 특별교실 및 유치원 증축과 병행하여 추진하고자 함

사업개요

❍ 소 재 지: 제주시 구좌읍 종달로7길 5

❍ 건축연면적: 1,725㎡(당초 1,530㎡)

❍ 사업기간: 2018년 8월~2020년 12월(당초 2018년8월~2019년6월)

【설계: 2019년 1월 ~ 2019년 8월】

❍ 사 업 비: 5,155,210천원(당초 3,654,210천원)

❍ 주요시설: 1층 급식실 및 특별교실, 2층 다목적강당, 유치원 별동 1동

(당초 1층 특별교실 및 유치원, 2층 다목적실)

❍ 사업주관: 제주시교육지원청

사업예산 확보계획

(단위 : 천원)

구분	계				2018년				2019년				비고
	계	국고	도청 보조금	자체	계	국고	도청 보조금	자체	계	국고	도청 보조금	자체
건물	5,155,210		1,100,000	3,903,210	152,000			152,000	5,003,210		1,100,000	3,903,210
계	5,155,210		1,100,000	3,903,210	152,000			152,000	5,003,210		1,100,000	3,903,210

기대효과

❍ 다목적강당, 급식실, 특별교실 및 유치원 공간 확충을 통해 학생들의 다양한 교육과정을 실현함으로써 교육수요자들의 만족도 향상

❍ 급식실 증축을 통한 현대화로 HACCP 규정에 맞는 급식 공간 확보 및 안전하고 위생적인 환경 조성

위치도

유치원

증축위치

1층 급식실, 특별교실

2층 다목적강당 증축위치

현장사진

유치원 증축위치

1층 급식실, 특별교실

2층 다목적강당 증축위치