2020년도 공유재산 관리계획(안)

(문화예술인마을 커뮤니티 센터 신축)

2020년도 공유재산 관리계획(안)

(문화예술인마을 커뮤니티 센터 신축)

의안 번호	882	제출일자: 2019년 11월 일 제 출 자: 제주특별자치도지사

1. 제안이유

□ 저지문화예술인마을 문화지구에 입주한 32명의 예술인들의 문화예술 활동 지원 여건을 소개하고 공유하는 매개 공간이 부족하고

□ 2018년도 신규 문화시설 11개 유치로 다양한 문화행사 개최 등 여건 변화에 걸 맞는 활성화 사업 기반시설 확보가 필요한 시점.

□ 입주예술인 창작활동 전시, 입주예술인 참여형 문화프로그램 운영, 주민·예술인·방문객을 위한 커뮤니티센터 운영과 주민협의회 활동 공간 지원으로 정책사업 실효성을 확보하고자 건축물(지상 2층)을 신축하는 내용으로

□ 「지방자치법」 제39조제1항제6호,「공유재산 및 물품 관리법」 제10조 및 동법 시행령 제7조, 「제주특별자치도 공유재산 관리조례」 제10조의 규정에 의거 2020년도 공유재산 관리계획(안)에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

□ 위    치: 제주시 한림읍 월림리 115-94

□ 사업기간: 2020년 1월～2021년 12월

□ 총사업비: 2,300백만원(국비 920, 도비 1,380)

□ 규    모: 1,000㎡

□ 주요시설: 사무실, 북카페, 전시실, 회의실, 교육실 등

□ 사업주관: 문화체육대외협력국 문화정책과

3. 기대효과

□ 주민, 방문객, 예술인 교감을 위한 매개 공간 확보로 문화지구 활성화

□ 예술인들의 활동 소개 및 문화프로그램 운영 등 도정시책 실효성 제고

4. 공유재산관리계획서: 별지와 같음

5. 참고자료

□ 사업계획서: 별첨

공유재산 관리계획서

제주특별자치도

공유재산 관리계획서

회계명: 일반회계

(단위: 동, ㎡, 천원)

구 분			2020년				2021년 이후				합 계				비 고
			건수	면 적	기준가격	사업비	건수	면 적	기준가격	사업비	건수	면 적	기준가격	사업비
취득	계	건물			100,000	100,000	1	1,000	2,200,000	2,200,000	1	1,000	2,300,000	2,300,000
	신축	건물			100,000	100,000	1	1,000	2,200,000	2,200,000	1	1,000	2,300,000	2,300,000	건물 신축

※ 기준가격은 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제7조에 따라 건물(신축)은 총사업비로 산정함

※ 사업비는 건물(신축)의 건축 비용(총사업비)으로 산정함

2021년도 취득대상 재산목록

회계명: 일반회계

(단위: ㎡, 천원)

일련 번호	재 산 의 표 시			기준가격	취득금액	취득시기	취득사유	취득재산 소유자 성명	비고
	지목 (구조)	소 재 지	면적
1	철근 콘크리트조	제주시 한림읍 월림리 115-94	1,000	2,300,000	2,300,000	2021년 하반기	방문객, 지역주민, 입주예술인 간 생활문화 운영 기반 커뮤니티 센터 신축	제주특별자치도	건물

※ 기준가격은 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제7조에 따라 건물(신축)은 총사업비로 산정함

※ 취득금액(사업비)은 건물(신축)의 건축 비용(총사업비)으로 산정함

【보조자료】

문화예술인마을 커뮤니티센터 신축

□ 사업개요

□ 위    치: 제주시 한림읍 월림리 115-94

□ 사업기간: 2020년 1월～2021년 12월

□ 총사업비: 2,300백만원(국비 920, 도비 1,380)

□ 규    모: 1,000㎡

□ 주요시설: 사무실, 북카페, 전시실, 회의실, 교육실 등

□ 사업주관: 문화체육대외협력국 문화정책과

□ 사업예산 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계				2020년				2021년 이후
	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타
시설비	2,300	920	1,380		100		100		2,200	820	1,380

□ 추진사항

□ 2018. 11. 30. 저지문화예술인마을 문화지구관리 변경계획 수립

- 문화지구 주민설명회 및 의견 청취

- 제주특별자치도 문화예술위원회 심의 절차 이행

□ 2018. 12. ∼ : 저지문화예술인마을 주민협의회 협의

- 매달 1회 이상 협의회의 개최 논의 시 커뮤니티센터 조성 필요성 제안

※ 저지문화예술인마을 주민협의회 건의 사항 서면보고(도지사): 2019. 10. 1.

□ 2020년 기본 및 실시설계 용역비 예산편성 요구

□ 추진계획

□ 문화예술인마을 커뮤니티센터 신축 기본 및 실시설계용역: 2020년 1월∼8월

□ 인허가 절차 이행: 2020년 5월∼8월

□ 사업발주: 2021년 1월

□ 사업완료: 2021년 10월

□ 기대효과

□ 주민, 방문객, 예술인 교감을 위한 매개 공간 확보로 문화지구 활성화

□ 예술인들의 활동 소개 및 문화프로그램 운영 등 도정시책 실효성 제고

□ 운영계획

□ 운영시기: 2021년 10월 조성사업 완료 후 운영

□ 운영주체: 문화정책과

□ 운영인력: 기존 인력 재배치 등 조정

※ 2020년도 실내영상스튜디오 건립 공사 완료 후 현대미술관, 김창열미술관, 공공수장고, 실내영상스튜디오 운영 등 현재의 조직을 통합조직으로 일원화한 운영방안 추진

□ 운 영 비: 지방비 확보

□ 위치도

□ 현장사진

노리갤러리

김창열 미술관

- 다목적 공간

저지-금악간 지방도