서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생활성화계획안 의견 제시의 건

2020. 9.

서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생활성화계획안 의견 제시의 건

의안번호	1454	제출연월일: 2020. 9. . 제 출 자: 제주특별자치도지사

Ⅰ. 의견청취 사유 및 주요계획 내용

1. 의견청취 사유

❍ 정부 100대 국정과제로 추진하고 있는 도시재생 뉴딜사업은 주거복지 실현, 도시경쟁력 강화, 사회통합, 일자리 창출을 목표로 단순 주거정비 사업이 아닌 쇠퇴한 도시를 재 활성화시켜 도시의 경쟁력을 높이고자 하는“도시혁신사업”으로서 연간 총 10조원, 5년간 총 50조원의 공적재원을 2017년부터 투입하여 전국 500곳을 집중 지원할 예정임.

❍ 서귀포시 원도심(중앙동)지역은 “제주특별자치도 도시재생 전략계획, 2018, 제주특별자치도” 활성화 지역으로 도시재생이 시급하다고 판단된 지역이며, 서귀포시 원도심의 단계별 도시재생 뉴딜사업을 추진하기 위해서는 『도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법』 제19조에 따라 도시재생활성화계획을 수립하여 도시재생사업을 추진하여야 함에 따라,

❍ 도시재생 사업을 위하여 『도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법』제20조 제3항에 따른 제주특별자치도의회의 의견을 청취하고자 하는 사항 임.

2. 근거법령 조항

「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」제19조 제1항, 제2항

① 전략계획수립권자는 도시재생활성화지역에 대하여 도시재생활성화계획을 수립할 수 있다.

② 구청장등은 도시재생활성화지역에 대하여 근린재생형 활성화계획을 수립할 수 있다.

『도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법』 제20조 제3항

① 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장 또는 특별자치도지사는 도시재생활성화계획을 수립하거나 변경하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방위원회의 심의를 거쳐 확정한다.

② 시장ㆍ군수 또는 구청장등이 도시재생활성화계획을 수립하거나 변경하려면 해당 특별시장ㆍ광역시장 또는 도지사의 승인을 받아야 한다. 이 경우 특별시장ㆍ광역시장 또는 도지사는 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③ 전략계획수립권자 또는 구청장등은 제1항의 경우에는 관계 행정기관의 장과 협의하기 전에, 제2항의 경우에는 도시재생활성화계획 승인 신청 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 공청회를 개최하여 주민이나 관계 전문가 등으로부터 의견을 수렴하고 해당 지방의회의 의견을 들어야 한다.

3. 도시재생 활성화계획안 주요내용

(1) 계획명: 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생활성화계획(일반근린형)

(2) 사업의 명칭: 주민이 함께 달리는 중앙동네 예체능

(3) 사업의 위치: 제주특별자치도 서귀포시 동문동로 27 일원

(4) 사업의 면적: 197,693㎡

(5) 총사업비: 793.7억 원

○ 도시재생사업: 199.6억 원

- 마중물사업: 183.3억 원(국비 110억 원, 지방비 73.3억 원)

- 자체재원: 5억 원                  - 기금(도시계정): 11억 원

- 민간: 0.3억 원

○ 부처협업사업: 462.1억 원

○ 지자체사업: 132억 원

(6) 사업기간: 2021년~2024년(4개년)

(7) 사업의 내용

가. 지속가능 도시재생 기반확보: 지역주민역량강화사업 등 3개 사업

나. 예술이 숨쉬는 문화·커뮤니티활성화: 혼디모영(커뮤니티센터 조성) 등 2개 사업

다. 건강하고 활기찬 우리 동네 만들기: 중앙동 생활체육센터조성 등 3개 사업

라. 골목기능 회복과 주거복지 실현: 적정기술 창작소(균형공작소) 등 9개 사업

마. 지역과 함께하는 돌봄자리 조성: 통합돌봄센터 조성

(8) 세부사업계획

【지속가능 도시재생 기반확보】

① 지역주민역량강화사업

❍ 위치: 중앙동 도시재생지원센터

❍ 사업기간: 2021년~2024년

❍ 예산규모: 800,000천 원(지방비)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 중앙동 도시재생현장지원센터

‣ 참여주체: 전문가 및 연계기관, 주민협의체

❍ 사업내용

‣ 도시재생대학               ‣ 사회적경제조직 발굴 및 육성

‣ 도시재생 거버넌스 운영 및 특화교육    ‣ 집수리 정비 교육

‣ 마을관리협동조합 육성 및 컨설팅       ‣ 주민공모사업

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시, 주민협의체

‣ 참여주체: 주민협의체 및 중앙동 지역주민

‣ 추진방법: 기존 사회적 경제조직 발굴 및 네트워크 구축을 통한 육성

❍ 사업효과

‣ 주민들의 역량 육성 및 자립기반 마련

‣ 주민들의 네트워크 및 지역공동체 활성화

② 도시재생현장지원센터 운영

❍ 위치: 중앙동 도시재생지원센터

❍ 사업기간: 2020년~2024년

❍ 예산규모: 1,330,000천 원(지방비)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 중앙동 도시재생현장지원센터

❍ 사업내용: 현장지원센터 운영

❍ 사업효과

‣ 지자체와 주민 간 가교역할을 수행하여 도시재생사업의 효과적 추진 도모

‣ 분야별 전문 인력 구성을 통해 도시재생사업 추진 시 발생 가능한 문제해결 및 대응능력 향상

③ 기록화 및 홍보 사업

❍ 위치: 중앙동 도시재생지원센터

❍ 사업기간: 2021년~2024년

❍ 예산규모: 600,000천 원(지방비)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 중앙동 도시재생현장지원센터

‣ 운영주체: 중앙동 도시재생현장지원센터

‣ 참여주체: 전문가, 주민협의체

❍ 사업내용

‣ 도시재생 모니터링 사업              ‣ 온라인 홍보 사업

‣ 오프라인 홍보 사업

❍ 사업효과

‣ 지역에 대한 애착심 고취 및 주인의식 제고

‣ 다양하고 지속적인 홍보 활동으로 지역 내 방문객 증가 및 지역 활성화

【예술이 숨쉬는 문화·커뮤니티 활성화】

① 혼디모영(커뮤니티센터) 조성

❍ 위치: 서귀포시 서귀동 267-8(359.6㎡), 267-32(107.5㎡)

❍ 사업기간: 2021년~2023년

❍ 예산규모: 3,797,000천 원(국비 2,945,000천원, 지방비 736,000천원, 자체재원 116,000천원)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 주민협의체, 마을관리협동조합

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생 현장지원센터, 공공건축가 및 전문가, 주민협의체

❍ 사업내용: 혼디모영(커뮤니티센터) 조성

- 기존시설물 철거(2동, 총 258.89㎡)

- 지상 3층, 신축 696㎡(연면적)

❍ 사업효과

‣ 지역주민 커뮤니티 형성을 복합적 기능 도입 및 효율적 공간 활용

‣ 다양한 문화프로그램 운영을 통한 지역 주민역량 강화 및 커뮤니티 거점 공간으로 지역주민 공동체 의식 형성 가능

② 혼디모영 및 주민 스스로 문화학교 운영

❍ 위치: 혼디모영(커뮤니티센터)

서귀포시 서귀동 267-8(359.6㎡), 267-32(107.5㎡)

❍ 사업기간: 2021년~2024년

❍ 예산규모: 460,000천 원(지방비)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 중앙동 마을관리협동조합

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생 현장지원센터, 전문가 및 연계기관, 주민협의체

❍ 사업내용

‣ 동아리신설 및 지원              ‣ 생활공동체 워크숍

‣ 폼나는 소극장 지원 프로그램      ‣ 영상미디어 제작 프로그램

❍ 사업효과

‣ 다양한 문화프로그램 운영을 통한 지역주민의 문화 욕구 해소 가능

‣ 지역주민들의 동호회 활동을 기반으로 한 정규공연프로그램 운영을 통해 동호회 육성 및 활동 장려

‣ 내가 사는 지역에 초등학생의 관심 유발 및 애향심 고취

【건강하고 활기찬 우리동네 만들기】

① 중앙동 생활체육센터 조성

❍ 위치: 서귀포시 서귀동 260-44(278.9㎡)

❍ 사업기간: 2021년~2022년

❍ 예산규모: 2,292,000천 원(국비 1,771,000천원, 지방비 442,000천원, 자체재원 79,000천원)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 주민협의체, 마을관리협동조합

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생 현장지원센터, 주민협의체

❍ 사업내용: 중앙동 생활체육센터 조성

- 기존시설물 철거(165.12㎡)

- 지상 3층, 신축 501㎡(연면적)

❍ 사업효과

‣ 지역주민들의 건강증진

‣ 생활체육을 통한 신규 주민조직의 구성 증대 및 공동체 활성화

② 중앙동 생활체육 프로젝트 운영

❍ 위치: 중앙동 생활체육센터(서귀포시 서귀동 260-44)

❍ 사업기간: 2021년~2024년

❍ 예산규모: 400,000천 원(지방비)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 중앙동 도시재생현장지원센터

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생 현장지원센터, 전문가, 주민협의체

❍ 사업내용

‣ 생활체육 동호회 발굴 지원    ‣ 생활체육 활성화 조직 육성

‣ 생활체육 동호회 공모 지원

❍ 사업효과

‣ 지역주민들의 건강한 삶과 생활의 질 개선

‣ 생활체육 연계상권 활성화

③ 건강한 산책길 조성

❍ 위치: 서귀동 250-54(47.4㎡), 250-25(47.5㎡), 250-5(182.6㎡)

❍ 사업기간: 2021년

❍ 예산규모: 68,000천 원(국비 51,000천원, 지방비 13,000천원, 자체재원 4,000천원)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 중앙동 주민센터

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생 현장지원센터, 전문가, 주민협의체

❍ 사업내용: 건강길 조성 50m

❍ 사업효과

‣ 지역의 가벼운 산책로 확보

‣ 건강을 위한 야외용 시설의 확보로 생활체육시설과 연계 가능

‣ 지역의 통합 돌봄 기능과 연계하여 보조적인 건강관리 시설로서의 역할 가능

【골목기능 회복과 주거복지 실현】

① 골목경제 살리기: 적정기술 창작소(균형공작소)

❍ 위치: 서귀포시 서귀동 280-2(295.2㎡)

❍ 예산규모: 3,412,000천 원(국비 1,750,000천원, 지방비 437,000천원, 자체재원 124,000천원, 기금 1,100,000천원)

❍ 사업내용

‣ 적정기술을 배우고 사용할 수 있도록 하는 활용할 수 있는 공간조성 및 IT기술을 콘텐츠로 한 교육 공간 조성

‣ 팹랩을 콘텐츠로 한 작업공간 조성을 통해 지역주민 및 전문 기술자들이 지식을 공유하고 제품을 직접 만들어 볼 수 있는 공간구성

❍ 사업규모: 적정기술 창작소(균형공작소): 779.5㎡(연면적, 4층)

※ 적정기술 공방, 공구 대여점, 팹랩, 프로그램운영실, 청년창업 코워킹 스페이스 등

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 마을관리협동조합

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생현장지원센터, 공공건축가 및 전문가, 주민협의체

❍ 사업기간: 2021년~2023년

❍ 사업효과

‣ 주민이 요청하는 도구나 관련 기술 등이 융합된 시설조성을 통해 지역을 대표하는 창작공방을 조성함과 동시에 관련 창업도 가능

‣ 아시아CGI애니메이션센터와 연계 가능한 아이템 도입으로 지속가능한 골목 상권 및 지역활성화

② 골목경제 살리기: 골목경제 살리기 프로그램

❍ 위치: 적정기술 창작소(균형공작소, 서귀포시 서귀동 280-2(295.2㎡))

❍ 예산규모: 800,000천 원(지방비)

❍ 사업내용

‣ 적정기술 전문가 양성 프로그램 운영     ‣ 팹랩 활용 프로그램

‣ 적정기술 전문가 네트워크 구축

‣ 공구 및 장비렌탈 매장 및 컨설턴트 양성 활용

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 마을관리협동조합

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생현장지원센터, 전문가, 주민협의체

❍ 사업기간: 2022년~2024년

❍ 사업효과

‣ 지역중심의 생활거점 내에서 필요한 지식과 기술을 습득하고 이를 실생활에 직접 적용해 삶의 질을 높이는데 기여

‣ 팹랩 등과 같은 전문적인 기술과 기기의 활용을 지역에 전파함으로써 지역의 경제적 위치를 업그레이드할 수 있는 계기를 만듬

③ 골목경제 살리기: 골목상권개선

❍ 위치: 중앙동 도시재생뉴딜사업 구역

❍ 예산규모: 225,000천 원(국비 171,000천원, 지방비 43,000천원, 자체재원 11,000천원)

❍ 사업기간: 2023년~2024년

❍ 사업내용

‣ 성인역량강화교육            ‣ 매장 컨설팅(30건)

‣ 매장환경 개선(15건)

❍ 사업효과: 전문 컨설팅을 통해 기존 상인들의 특성을 파악하고 해결책을 통해 골목경제의 활성화

④ 주거 및 보행환경 개선: 폼나는 우리집 맹글사업

❍ 위치: 중앙동 도시재생뉴딜사업 구역

❍ 예산규모: 470,000천 원(국비 338,000천원, 지방비 84,000천원, 자체재원 18,000천원)

❍ 사업기간: 2021년~2024년

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생현장지원센터, 공공건축가 및 전문가, 주민협의체

❍ 사업내용: 노후 및 불량주택 정비 30건

※ 「서귀포시 중앙동 도시재생 가로경관 디자인 가이드라인(안)」 적용하여 경관개선

❍ 사업효과: 도시재생사업 지역 내 최소한의 노후주택 개선을 통해 쾌적한 주거환경 조성 가능

⑤ 주거 및 보행환경 개선: 걸어댕기기 좋은 길 조성

❍ 위치: 중앙동 도시재생뉴딜사업 구역

❍ 예산규모: 1,440,000천 원(국비 1,098,000천원, 지방비 274,000천원, 자체재원 68,000천원)

❍ 사업기간: 2021년~2023년

❍ 사업내용: 보행환경 개선(안전보행환경개선, 야간보행 환경개선, 경관개선)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 서귀포시

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생현장지원센터, 공공건축가 및 전문가, 주민협의체

❍ 기대효과

‣ CPTED(범죄예방환경디자인)를 적용한 안전·안심 보행환경조성을 통해 지역 주민의 안전한 보행권 확보로 주거환경개선 가능

‣ 야간보행환경개선을 통한 야간경관 명소화, 안전한 야간보행권 확보를 통해 야간 지역 활성화 가능

⑥ 주거 및 보행환경 개선: 주차시설 확보

❍ 위치: 서귀동 264-2(204㎡), 261-1(225㎡), 261-2(243.3㎡)

❍ 예산규모: 1,514,000천 원(국비 1,198,000천원, 지방비 300,000천원, 자체재원 16,000천원)

❍ 사업기간: 2024년

❍ 사업내용: 주차장 시설(총 3개소, 23대)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 서귀포시

❍ 기대효과

‣ 나대지 및 공유지 활용한 주차장 조성으로 지역 내 주차장 확보

‣ 스마트시스템 도입으로 편리한 주차이용

⑦ 주거 및 보행환경 개선〉쾌적한 생활터전 조성: 햇볕공원 조성

❍ 위치: 서귀동 262-1(361.2㎡), 263-16(47.7㎡)

❍ 예산규모: 45,000천 원(국비 34,000천원, 지방비 9,000천원, 자체재원 2,000천원)

❍ 사업기간: 2021년

❍ 사업내용: 야간 디자인조명 설치 2곳

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 중앙동 주민센터

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생현장지원센터, 주민협의체

❍ 기대효과

‣ 범죄 예방 등 지역주민들의 밤길 안전 확보

‣ 체육시설 야간 이용 편의 증대

⑧ 주거 및 보행환경 개선〉쾌적한 생활터전 조성: 숨쉬는 마을 쉼터 조성

❍ 위치: 서귀동 260-4번지(136.5㎡)

❍ 예산규모: 90,000천 원(국비 68,000천원, 지방비 17,000천원, 자제재원 5,000천원)

❍ 사업기간: 2024년

❍ 사업내용: 숨쉬는 마을 쉼터 조성(136.5㎡)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 중앙동 주민센터

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생현장지원센터, 주민협의체

❍ 기대효과

‣ 지역내의 교류의 장으로 공동체 활성화에 효과

⑨ 주거 및 보행환경 개선〉쾌적한 생활터전 조성: 재활용 도움센터 설치

❍ 위치: 서귀동 269-4번지

❍ 예산규모: 1,140,000천 원(국비 86,000천원, 지방비 22,000천원, 자체재원 6,000천원)

❍ 사업기간: 2024년

❍ 사업내용: 재활용 도움센터 설치(72㎡)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 중앙동 주민센터

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생현장지원센터, 주민협의체

❍ 기대효과: 쓰레기 감소를 위한 지역 주민들의 적극적 참여를 유도

【지역과 함께하는 돌봄자리 조성】

① 통합돌봄센터 조성

❍ 위치: 서귀동 251-3번지(196.1㎡)

❍ 사업기간: 2021년~2023년

❍ 예산규모: 1,912,000천원(국비 1,490,000천원, 지방비 372,000천원, 자체재원 50,000천원)

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

‣ 운영주체: 다함께 돌봄센터

‣ 참여주체: 중앙동 도시재생현장지원센터, 주민협의체

❍ 사업내용

‣ 높은 실버층 인구분포에 따라 돌봄이 필요한 생애주기 중 노년기에 대한 케어 수요 충족 필요

‣ 도시재생활성화지역 내 부족한 생활SOC 시설 중 경로당 등 노인시설을 대체 할 수 있는 통합돌봄 시설 조성 및 프로그램 운영 필요

‣ 실버케어 거점시설은 유동인구가 많으므로 무인택배함 설치를 통해 수취에 대한 편의성 확보 및 보안강화

❍ 사업규모

‣ 중앙 통합 돌봄센터: 428.27㎡(연면적), 3층

‣ 프로그램 운영실, 무인택배함, 고령자 임시복지주택 등

❍ 사업효과

‣ 생애주기에 따른 돌봄 수요에 대항할 수 있도록 지역 중심의 맞춤형 돌봄체계 구축

‣ 다함께 돌봄사업, 지역사회 통합돌봄사업과 같은 부처협업사업 및 서귀포종합사회복지관과 연계하여 운영관리에 대한 전문성 및 실행력 확보

【기타사업비】

① 계획수립

❍ 위치: 중앙동 도시재생 뉴딜사업 구역

❍ 예산규모: 194,000천 원(지방비)

❍ 사업기간: 2018년 ~ 2020년

❍ 추진단계별 주체별 역할

‣ 시행주체: 서귀포시

❍ 사업내용

‣ 도시재생 기본 방침과 도시재생전략계획과 부합하도록 활성화계획 수립

‣ 지역 쇠퇴 양상 및 원인, 잠재력 및 자원 등에 대한 현황 진단을 통해 목표 도출

‣ 주민주도형 사업추진을 위한 구체적인 사업 발굴 및 계획수립

❍ 사업효과

‣ 주민의견 및 지역현황에 따른 비전 및 세부사업 발굴하여 도시재생뉴딜사업 선정

‣ 주민주도형 도시재생뉴딜사업 시행 방향 제시

(9) 총괄사업계획표

구분	단위 사업		세부사업				사업비(백만원)									사업기간
							계	도시재생재정보조		부처연계		별도 지방비	공기업	기금	민간
								국비	지방비	국비	지방비
총 합계							79,361	11,000	7,333	14,030	21,081	13,684	11,103	1,100	30
마중물사업	합 계						19,963	11,000	7,333			500		1,100	30
	① 지속가능 도시재생 기반확보		계				2,730		2,730
			주민역량 강화 사업			S/W	800		800							21~24
			도시재생현장지원센터 운영			S/W	1,330		1,330							20~24
			기록화 및 홍보사업			S/W	600		600							21~24
	② 예술이 숨쉬는 문화·커뮤니티 활성화		계				4,257	2,945	1,196			116
			□디모영(커뮤니티센터)조성			H/W	3,797	2,945	736			116				21~23
			혼디모영 및 주민 스스로문화학교(②-2)			S/W	460		460							21~24
	③ 건강하고 활기찬 우리동네 만들기		계				2,760	1,822	855			83
			중앙동 생활체육센터 조성			H/W	2,292	1,771	442			79				20~22
			건강마을 중앙동 프로젝트 운영			S/W	400		400							21~24
			건강한 산책길 조성			H/W	68	51	13			4				21
	④ 골목기능 회복과 주거복지 실현	계					8,110	4,743	1,986			251		1,100	30
		골목경제 살리기	적정기술 창작소(균형공작소)			H/W	3,412	1,750	437			125		1,100		22~23
			골목경제살리기 프로그램 운영			S/W	800		800							21~24
			골목상권 개선			H/W	225	171	43			11				23~24
		주거 및 보행환경 개선	폼나는 우리집 맹글사업			H/W	470	338	84			18			30	21~24
			걸어댕기기 좋은길 조성			H/W	1,440	1,098	274			68				22~23
			주차시설 확보			H/W	1,514	1,198	300			16				24
			쾌적한 생활터전 조성	햇볕공원 조성		H/W	45	34	9			2				21
				숨쉬는 마을쉼터 조성		H/W	90	68	17			5				24
				재활용도움센터 조성(④-9)		H/W	114	86	22			6				22
	⑤ 지역과 함께하는 돌봄자리 조성		계				1,912	1,490	372			50
			통합돌봄센터 조성(⑤-1)			H/W	1,912	1,490	372			50				21
	⑥ 기타 사업비		계				194		194
			계획수립			S/W	194		194							18~20
지자체	합 계						13,184					13,184
	서귀포시 문화광장 조성사업						13,184					13,184				15~25
부처연계	합 계						46,214			14,030	21,081		11,103
	지역사회통합돌봄선도사업(⑤-1)				보건복지부		4,260			2,130	2,130					19~21
	서귀포시문화도시조성계획(②-2)				문화관광부		19,900			9,900	10,000					20~24
	중앙동공공청사복합개발(④-9)				국토교통부 +서귀포시+LH		22,054			2,000	8,951		11,103			20~22

(10) 사업계획도

4. 추진상황

❍ 2017. 10. 23. ~ 10. 25.: 2017년 도시재생 뉴딜사업 지구 제안서 제출

❍ 2017. 11. 1. ~ 11. 22.: 서귀포시 도시재생 아카데미 운영

❍ 2018. 3. 8. ~ 29.: 제2기 서귀포시 도시재생 아카데미 운영

❍ 2018. 4. 26. ~ 7. 19.: 2018 서귀포시 원도심 도시재생대학

❍ 2018. 6. 28.: 서귀포시 원도심 도시재생 활성화계획 수립용역 착수(15개월)

- 위    치: 서귀포시 원도심(중앙, 천지, 정방, 송산) 일원

- 사 업 량: 도시재생 활성화계획 수립(A=199,138㎡)

- 용역업체: ㈜리헌기술단, 제주국제대학교 산학협력단

❍ 2018. 7. 5.: 2018년 도시재생 뉴딜사업(중앙) 공모서 제출

❍ 2018. 8. 9.: 2018년 도시재생 뉴딜사업(중앙)공모 발표 평가

❍ 2018. 8. 30. ~ 9. 20.: 제3기 서귀포시 도시재생 아카데미 운영

❍ 2019. 1. 30.: 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생 주민협의체 모집

❍ 2019. 2. 22.: 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생 주민협의체 구성·운영(위원장 오명필 외 9명)

※ 주민협의체 운영(2020. 6. 26. 현재 32명, 횟수 20회)

❍ 2019. 3. 22.: 서귀포시 중앙동 도시재생뉴딜사업 추진 TF 구성·운영

❍ 2019. 3. 22.: 2019년 도시재생대학 운영(~ 4. 30.)

❍ 2019. 4. 17.: 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생 주민 공청회 개최(장소: 중앙동주민센터)

❍ 2019. 5. 22.: 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생 지방의회 의견 청취

❍ 2019. 7. 31.: 2019년 도시재생 뉴딜사업(중앙) 공모서 제출(면적 197,693㎡)

❍ 2019. 8. 29.: 2019년 도시재생 뉴딜사업(중앙)공모 발표 평가

※ 미선정(주요사유: 부지 미확보)

❍ 2020. 6. 3.: 2020년 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생 활성화계획 수립 용역(보완)

- 용역업체: 올리도시건축연구소

❍ 2020. 7. 2.: 2019년 도시재생 뉴딜사업(중앙) 공모서 제출(면적 197,693㎡)

❍ 2020. 8. 12.: 2020년 도시재생 뉴딜사업(광역)공모 발표 평가

❍ 2020. 8. 14.: 2020년 도시재생 뉴딜사업 대상지 선정 및 국토부 신청(도→국토부)

5. 향후 일정

❍ 2020. 9.: 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생 지방의회 의견 청취 및 주민공청회 개최

❍ 2020. 9. ~ 10.: 실타평가→실무위 검토→특위 심의→사업선정(국토부)

❍ 2020. 10.: 2020년도 도시재생 뉴딜사업 공모 및 도시재생활성화계획안 승인(국토교통부)

❍ 2020. 12.: 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생활성화계획 고시

❍ 2021. ~ 2024.: 사업시행

※첨부

1) 주민공청회 공고문

【주민공청회 공고문】