소형도서 재생에너지 전환사업 업무협약 체결 보고

❍ 산업통상자원부에서 주관한 소형도서 재생에너지 전환사업 가파도 선정(’21. 7. 30.) 및 협약체결(제주도 ↔ 한국전력공사‘21. 9. 13.)

- 사업비 65억(전액국비) 투입, 가파도 내 전력을 재생에너지 대체(최소 60% 이상)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 가파도 소형도서 재생에너지 전환사업

❍ 사업기간 : ‘21. 8. ~ ’22. 12.(16개월)

❍ 총사업비 : 65억(국비) 내외

❍ 사업내용(변경예정) : 소형풍력 5기(50㎾), 태양광 900㎾, ESS 2㎿ 등

※ 재생에너지 발전원 및 설비용량 등 사업규모 및 사업비 설계용역 후 최종 확정

❍ 주관기관 / 수행기관 : 산업통상자원부 / 한국전력공사, 제주특별자치도

□ 추진사항 및 향후일정

❍ ‘11. 11. : 가파도 Carbon Free Island 구축을 위한 협약(도↔한전↔남부발전)

❍ ‘12.  3. ~ ’16. 4. : 가파도 Carbon Free Island 사업추진

※ 신재생 이용률 : ‘17년 44.6%→‘19년 23.7%→‘20년 28.1% →’21년 9%(풍력발전기 정지)

❍ ‘21.  5.  7. : 가파도 CFI사업 정상화를 위한 공모사업 신청(도 → 산업부)

❍ ‘21.  7. 30. : 소형도서 재생에너지 전환사업 가파도 선정

❍ ‘21.  9. 13. : 전환사업 업무협약(제주도 ↔ 한국전력)

❍‘21.  11. ~ : 실시설계 및 시공(’22. 12월 준공예정)

□ 주요 협약내용

❍ (제 주 도) 구축부지 제공 및 인허가 지원, 기존 풍력발전기 철거

❍ (한국전력) 재생에너지 발전설비 설계·구축 및 운영(대체율 최소 60% 이상)

□ 기대효과

❍ 가파도는 국내 최초 에너지 자립 섬 시범모델을 구현한 섬으로, 뉴딜사업을 통한 신재생설비 개선으로 제주도 분산에너지 축소판 재현