8㎿ 부유식 해상풍력시스템 개발 업무협약 체결 보고

❍ 부유식 해상풍력시스템 개발사업 과제 제주도 선정(‘21. 3. 12.)

- 4개 컨소시엄(제주, 울산, 전남, 전북) 경쟁 후 제주도 최종 선정

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 8㎿급 부유식 해상풍력시스템 개발

❍ 총사업비 : 총433억원(국비 270억, 지방비 45억, 민간 118억)

❍ 사업기간 : (1단계) ‘20. 5. ~ 21. 1.(완료) / (2단계) ‘21. 7. ~ 25. 9.(50개월)

❍ 사업내용 : 8㎿급(두산중공업) 부유식 해상풍력 실증

❍ 실증장소 : 제주시 한경면 용수리(파력발전소 인근)

※ 참여기관 : 제주도, 두산중공업, 제주에너지공사, 고등기술연구원, 선박해양플랜트연구소 등 11개 기관

□ 추진사항 및 향후일정

❍ ‘20.  3. 30. : 제주특별자치도 사업 참여의향서 제출(도 → 산업부)

❍ ‘20.  5. 25. : 1단계 사업 선정(4개 지자체 : 제주도, 울산, 전남, 전북)

❍ ‘21.  2.  9. : 2단계 사업자 선정을 위한 1단계 사업 평가

❍ ‘21.  3. 12. : 2단계 사업 선정결과 발표(제주도 컨소시엄 선정)

❍ ‘21.  5. 21. : 제1차 지방재정 중앙투자사업 심사 조건부 승인

❍ ‘21.  7. 30. : 2단계 사업 업무협약

❍ (‘21)기본설계→(‘22)상세설계→(’23)발전기제작→(‘24)설치 및 실증

□ 주요 협약내용

❍ (제주도 컨소 ↔ 에너지기술평가원) 부유식 해상풍력발전기 실증 및 상용화단지 발굴

❍ (제주도 및 제주에너지공사 역활) 실증을 통한 상용화단지 발굴

□ 기대효과

❍ 실증단지 지역에 파력시험장 운영, 부유식 해상풍력 실증, 수소실증 검토 등 향후 연구기관 유치를 통한 해양에너지 클러스터 조성