제주특별자치도의회 제403회 임시회

문화관광체육위원회

저지 문화지구 활성화 계획 수립용역 결과 보고

(문화체육대외협력국)

저지 문화지구 활성화 계획 수립용역 결과 보고

◇ 저지 문화예술인마을 조성 시작(2000년) 이후 정체에 직면한 문화지구에 대해 기반시설 재정비, 신규 문화공간 조성 등 활성화 용역 추진

Ⅰ		용역개요

❍ 용역기간/용역비: ‘21. 9. ~ ‘22. 2.(5개월)/ 81백만원

❍ 용역수행자: ㈜메타기획컨설팅(대표 이승훈)

❍ 용역내용

- 저지 문화지구 현황･여건 검토 분석 및 활성화 사업 발굴

- 가칭 ‘중광미술관‘ 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립

- 문화예술 공공수장고 시설 확충 및 추진계획 수립

❍ 추진상황

- 입주 예술인 및 전문가 의견 수렴(‘21. 5. ~ 12, 6회)

- 착수보고(’21. 10.), 중간보고(1차: ‘21. 12./ 2차: ’22. 2.), 최종보고(‘22. 2.)

	【 저지 문화지구 현황 】
- 위치: 제주시 한경면 저지리, 한림읍 월림리 일대 / ‘10. 3. 8. 문화지구 지정고시(325,100㎡) - 공공시설: 현대미술관, 김창열미술관, 공공수장고, 실내영상스튜디오 등 4개 시설 - 민간시설: 먹글이 있는 집, 규당미술관, 예나르박물관 등 33개 시설

Ⅱ		주요 사업계획(案)

4대 부문 12개 과제, ‘22.~‘26, 84억원

저지 문화지구 활성화 방안

① 유휴공간 및 문화자원 활용을 통한 공공적 기능 확대

- 생태계 조사 및 환경보존, 공원조성, 서예전시관, 생활문화센터 조성 운영

* 서예전시관(가칭): 지상 2층, 건축물 494㎡, 상설/기획전시, 전시 및 수장공간 정비, 운영인력 2명

생활문화센터: 지상 2층, 건축물 700㎡, 전시공간, 공유라운지, 프리마켓, 운영인력 2명

② 아름답고 쾌적한 환경을 위한 공간 정비 및 개선

- 예술路 조성 및 도로환경 정비, 안내시설물 및 가로시설물 확충 정비

* 예술路: 문화지구 내 관람동선에 조형물 또는 문화예술작품 활용 특화공간 조성

- 주차공간 및 편의시설 확충, 휴게공간 조성, 경관관리(건축가이드라인 마련)

- 유휴부지 및 공유재산 활용을 위한 균형있는 토지이용계획 마련

③ 예술ㆍ창작 프로젝트 기획을 통한 정체성 및 콘텐츠 강화

- 입주 예술인 협력 프로젝트 추진, 방문객 체험 프로그램 운영

- 입주 예술인 및 방문객 참여 문화예술 축제 운영, SNS 등 홍보 강화

④ 지역 문화자원과의 연계 및 협력을 통한 공동체 운영체계 구축

- 예술인 마을 주민협의회 운영을 통한 자생력 강화 및 네트워크 구축 확장

- 제주 청년작가, 저명 예술인 연계를 통한 문화예술 창작, 교류 및 프로그램 운영

‘22.~‘25, 50억원

(가칭) 중광미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획

○ 제주출신 중광스님 작품 토대 전시-교육･체험-참여중심의 복합문화공간

- 전시와 공연, 퍼포먼스 등 실험적이고 다양한 체험을 위한 공간 제공

- 현대미술관 등 유기적 연계를 통한 문화예술 콘텐츠 형성·시너지 창출

	【중광미술관 건립(안)】
- (건축규모) 지상 2층, 연면적 700㎡, 기획 및 상설전시실·수장고·관리 및 공용공간 등 - (운영조직) 6명(관장1, 학예 1, 행정시설 2, 공무 2) ※ (도+도의회+기증자) 협약(’21. 7.) → 중앙투자심사(‘21. 10. 행안부) → 설립타당성 평가(’22. 3.~4. 문체부) → 실시설계 및 건축공사(‘22. 7.~’24. 12.) → 등록･개관(‘25. 1. 예정)

‘22.~‘24, 75억원

문화예술 공공수장고 시설 확충

○ 제주 문화예술자산 보존․관리의 종합적 기능 수행을 위한 공간 확충

- 2,000점 ~ 3,200점 추가 수장, 연면적 1,625㎡, 수평 증축

	【공공수장고 확충(안)】
- (확충규모) 지상 1층, 연면적 1,625㎡, 수장고 2실, 보존처리실 2실, 훈증실, 소화약제실 등 - (운영조직) 7명(총괄 5급 1, 수장품 보존처리 학예사 4, 행정 2) ※ 투자심사(‘21. 10.)→실시설계 및 건축공사(‘22. 4.~’24. 12.)→1단계 완료, 개관(‘25. 1. 예정)

Ⅲ		향후계획

❍ ‘22. ~ ’26. 연차별 계획에 따라 세부사업 추진

< 참고자료 >		연차별 사업비 계획

① 저지 문화지구 활성화 사업                             (단위: 백만원)

과 제 명		합계	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
합 계		8,475	1,624	1,880	1,905	1,655	1,411
부 문 1. 공공적 기능 확대		3,300	1,037	975	650	438	200
1	환경가치를 이어가기 위한 수목의 보존과 제한적 활용	250	-	100	150	-	-
2	기증 및 제안에 따른 공유재산 공공성 확대	600	37	75	250	238	-
3	저지 문화지구 내외를 연결하는 거점 공간 마련	2,450	1,000	800	250	200	200
부 문 2. 공간 정비 및 개선		2,600	538	600	600	562	300
4	보행친화 환경을 위한 예술길 및 가로 시설물 조성	1,600	300	300	400	300	300
5	방문객을 위한 주차공간 확보 및 편의시설 조성	1,000	238	300	200	262	-
6	건축 가이드라인에 따른 지속적인 경관/디자인 관리	-	-	-	-	-	-
7	토지이용계획에 따른 유휴부지 및 공유재산 활용	-	-	-	-	-	-
부 문 3. 정체성 및 콘텐츠 강화		1,425	39	285	285	285	531
8	입주 예술인 협력 프로젝트 추진	275	10	55	55	55	100
9	방문객 참여 프로그램 개발 및 운영	750	19	150	150	150	281
10	홍보 및 소통 채널 강화	400	10	80	80	80	150
부 문 4. 공동체 운영체계 구축		1,150	10	20	370	370	380
11	예술 창작 네트워크 구축 및 확장	550	10	20	170	170	180
12	문화예술 유관기관 및 저명 예술인과의 협력체계 구축	600	-	-	200	200	200

② (가칭) 중광미술관 건립                                  (단위: 백만원)

구 분	합 계	기 투 자	‘22년	‘23년	‘24년
합 계	5,000	100	560	2,170	2,170
공 사 비	4,060	-	-	2,030	2,030
설계, 감리비	440	-	300	70	70
부 대 비 등	500	100	260	70	70

③ 문화예술 공공수장고 시설 확충                          (단위: 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
합 계	7,500	454	3,523	3,523
공 사 비	6,012	-	3,006	3,006
설계, 감리비	509	285	112	112
부 대 비 등	979	169	405	405