‘재생에너지 적정규모 산정 연구용역’ 주요 사항의 건 보고

◈ 출력제어 최소화를 위한 태양광‧풍력 적정규모 산정 연구용역 주요 내용 및 향후 추진 계획에 대해 보고 드림

□ 용역개요

❍ (용역 수행기관) 제주연구원

❍ (용역기간 및 용역비) ‘21. 7. 13.~12. 24.(5개월) / 73백만원(풍력기금)

❍ (추진상황) 착수보고회(7.26.), 중간보고회(11.4.), 실무협의체* 회의(6회)

* 제주도-한전-전력거래소-한국에너지공단-제주에너지공사 실무진 참여

□ 주요내용

❍ (주요내용) 출력제어 상황, 재생에너지 단기 보급목표량 등 산정

- (출력제어) CFI2030계획 추진 시 2030년도 11.6%까지 증가

- (단기계획) ESS 설치(‘23.), 제3 해저연계선(’23.) 준공 전 속도조절

< 재생에너지 도입목표 조정(안)>

(단위: MW)

구분	CFI2030계획		조정 1안 (제3연계선 포함)		조정 2안 (제3연계선, ESS구축)
	태양광	풍력	태양광	풍력	태양광	풍력
2022년	659.5	975	600	431	600	431
2023년	780.3	1,015	702.2	560	858.3	606.2
2024년	911.7	1,075	911.7	865	911.7	865
2025년	1,034	1,265	1,034	1,165	1,034	1,165

* 풍력발전시설에 대한 출력제어 3% 기준으로 도입목표(안) 설정(태양광 출력제어 無)

- (중장기계획) ESS 확대 규모 도출* 및 신규 전력수요처 발굴**

* 2026년~2028년도 180MW-1,080MWh 정도 수준의 ESS 필요

** 그린수소 기반 수소경제 구축, 전력-비전력 연계 섹터커플링 기술개발, 데이테센터 유치 등

- (기타사항) 보급 정책을 넘어선 에너지 통합 관리 시스템 구축(필요)

□ 향후계획

❍ 용역 결과를 반영한 제주형 재생에너지 가이드라인 수립: ’22. 하반기

❍ 출력제어 완화용 ESS 구축 추진: ‘22. ~ ’24.

❍ 섹터커플링(그린수소 생산, 열전환 등) 실증과제 추진: ‘22. ~ ’26.