제407회 제주특별자치도의회 임시회

농수축경제위원회

2022년 주요 업무 보고

2022. 7.

보고순서

	Ⅰ	일반현황
	Ⅱ	정책목표와 전략
	Ⅲ Ⅲ	2022년 주요업무 계획

Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅰ. 일반현황

1		기구 및 정·현원

❋ 기구 : 1사업소 2처 1센터 7팀

																											사 장
경영안전기획처																						그린뉴딜사업처										지역에너지연구센터								발전단지운영사업소
기획 관리팀						경영 지원팀								중대재해 안전감찰팀								그린에너지전환팀					풍력사업 개발팀					신사업추진팀								재해안전 운영총괄팀

❋ 인력 : 정원 60명 / 현원 53명(2022. 7. 1.기준)

(단위 : 명)

구 분	계	사장	일 반 직						공무직
			1급	2급	3급	4급	5급	6급	5급	6급
정 원	60	1	-	2	2	49			6
현 원	53	-	-	1	3	11	19	14	3	2
결 원	7	△1		△1	1	△5			△1

※ 제2회 공공기관 통합채용 진행 중: 모집인원 5명(9월 임용 예정)

2		주 요 기 능

부 서		주 요 업 무
경영 안전 기획처	기획관리팀	❍ 경영기획, 정책협의, 소통협력 ❍ 성과관리, 경영혁신, 사회공헌 사업 ❍ 예산관리, 재무관리, 홍보
	경영지원팀	❍ 인사･보상･노무관리, 기록물관리 ❍ 교육훈련, 정보화, 지출회계, 경영지원 ❍ 재산 및 물품 관리, 계약관리, 청사관리
	중대재해 안전감찰팀	❍ ESG 경영, 윤리･인권경영, 고객만족경영 ❍ 안전·보건 관리 총괄, 친환경 경영
그린 뉴딜 사업처	그린에너지 전환팀	❍ 전기자동차 충전 인프라 보급 ❍ 신재생에너지 융복합 EV충전 스테이션 모델 구축 ❍ 태양광 발전사업 추진
	풍력사업 개발팀	❍ 신규 육·해상 풍력사업 개발 ❍ 구좌지역 해상 풍력사업 개발
	태양광 사업PM	❍ 공유지 및 공공시설 활용 태양광 발전사업 추진 ❍ 주민참여형 태양광 발전사업 개발
지역 에너지 연구 센터	신사업 추진팀	❍ 국책 연구사업 연구･기획 ❍ 그린수소 사업 기반 R&D 사업 ❍ 에너지 역량 강화 및 기술 교류 ❍ 신사업 발굴 및 기획 ❍ 수소 및 모빌리티 상용화 사업 추진
발전 단지 운영 사업소	재해안전 운영총괄팀	❍ 통합관리시스템 운영 및 플랫폼 구축 ❍ 발전설비 효율성 강화, 관할 현장 중대재해 예방 총괄 ❍ CFI에너지미래관 운영
	운영1파트	❍ 동복･북촌/행원 연안 풍력발전단지 운영관리 ❍ 어승생/태양광 발전단지 운영관리 ❍ 전문기업 및 우수 인재 양성 ❍ 자체설비 진단, 고장 대응
	운영2파트	❍ 행원･신창/가시･김녕 풍력발전단지 등 운영관리 ❍ 운영관리 기술력 향상 ❍ 드론활용설비 진단(가시, 김녕, 행원, 신창 등)

3		재 정 현 황

❍ 자본금 : 1,306.5억원(제주특별자치도 현물출자 100%)

수권자본금		설립자본금		납입자본금
500,000백만원		8,063백만원		130,653백만원

※ ΄12.11.23. 김녕, 가시리 풍력발전단지 현물출자로 583억원 증자

※ ΄19.11.01. 공사 풍력발전단지 인근 토지 현물출자로 643억원 증자

❍ 재무구조

(단위 : 백만원)

연 도	자 산	부 채(A)	자 본(B)	차입 부채 (누적액)	부채비율 (A/B, %)	비 고
2013년	72,669	3,667	69,002	0	5.31
2014년	91,461	19,645	71,816	16,300	27.35
2015년	129,766	57,138	72,628	55,000	78.67
2016년	127,959	53,758	74,201	50,520	72.45
2017년	123,542	47,805	75,737	43,021	63.12
2018년	117,354	39,144	78,210	31,355	50.05
2019년	175,074	30,753	144,321	26,562	21.31
2020년	166,254	22,924	143,330	21,250	15.99
2021년	162,214	18,219	143,994	15,938	12.65

❍ 2022년도 예산

(단위 : 백만원)

수 입			지 출
구분	2022년	비율(%)	구분	2022년	비율(%)
합계	28,439	100.0	합계	28,439	100.0
전력판매수익	13,845	48.68	영업비용	10,894	38.31
			영업외비용	2,348	8.26
대행사업수수료수익	231	0.81
			법인세	150	0.53
이자수입	46	0.16
			유형자산	52	0.18
기타영업외수익	2,078	7.31
			무형자산	10	0.04
공사채(차입금)	-	-
			유동부채상환금	8,972	31.55
유동부채수입	8,839	31.08
			비유동부채상환금	5,312	18.68
자본잉여금수입	-	-
			건설중인자산	297	1.04
기타자본적수입	-	-
			건물	33	0.12
순세계잉여금	3,400	11.96
			예비비	371	1.30

※ 영업비용에 현금지출이 없는 감가상각비(6,406백만원) 제외

❍ 신재생에너지 시설 현황 (기준일 : 2021. 12. 31.)

구 분		규 모	준공년도	전력생산량
풍 력 발 전	계	56,830㎾(40기)		96,658㎿h
	행 원	9,380㎾(9기)	2000년 ~ 2013년	18,066㎿h
	신 창	1,700㎾(2기)	2006년	2,593㎿h
	김 녕	750㎾(1기)	2010년	960㎿h
	가 시 리	15,000㎾(13기)	2012년	20,716㎿h
	동복·북촌	30,000㎾(15기)	2015년	54,323㎿h
태양광 발 전	계	1,502㎾		1,516㎿h
	행 원	415.2㎾(1식)	2010년	266㎿h
	제주종합경기장	490㎾(1식)	2016년	570㎿h
	교 래	496.8㎾(1식)	2018년	581㎿h
	CFI에너지미래관주차장	99.7kW(1식)	2018년	99㎿h
E S S 시 설	계	27,221㎾h
	동복·북촌	18,000㎾h(1식)	2016년
	가 시 리	9,000㎾h(1식)	2016년
	CFI에너지미래관주차장	221kWh(1식)	2018년
EV 충전 설비	CFI에너지미래관주차장	4기(7ch)(1식)	2018년
송 전 선 로	계	32.42㎞
	행원 ~ 성산변전소	24.5㎞
	가시리 ~ 표선변전소	6.15㎞
	동복 ~ 조천변전소	1.77㎞

❍ CFI에너지미래관 현황

- 위    치	: 제주시 구좌읍 해맞이해안로 712-3 일원(소유기관 : 제주에너지공사)

- 사 업  비	: 70억원(국비 36억원, 지방비 24억원, 기금 10억원)

- 건설기간	: ‵08. 1. ~ ‵10. 5. (개소 : ‵10.4. / 현물출자[도→에너지공사] : ‵12.12.)

- 규     모	: 건축물 1,719㎡(연면적 2,467㎡, 지상 2층)/부지 25,306㎡

- 주요시설	: CFI 체험공간(CFI미래관, 비전홀), 4D 영상관 등

※ 신재생에너지와 정보기술이 결합된 미래상을 제시하기 위하여 ‵신재생  에너지홍보관‵에서 ‵CFI에너지미래관‵으로 명칭 변경

- 연도별 이용 현황(‵21. 12. 31. 기준)

연 도	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
관람인원(명)	35,076	35,980	30,547	33,149	29,773	22,151	16,720	6,130	2,591

* 코로나19 확산에 따른 CFI에너지미래관 휴관 실시(‵20. 2. 25. ~ 6. 18.(3개월 간) 휴관)

** 코로나19 확산 및 리모델링에 따른 CFI에너지미래관 휴관 실시(‵20. 12. 23.~‵21. 5. 26.(5개월 간) 휴관)

Ⅱ. 정책목표와 전략

Ⅱ. 정책목표와 전략

경 영 슬 로 건		CFI 제주, 글로벌 에너지의 미래를 선도합니다.
경 영 방 침		현장경영 / 열린경영 / 기술경영
미 션		에너지자원의 공공적 활용으로 탄소없는 사회 실현
비 전		청정에너지로 미래를 여는 친환경 에너지 공기업
핵 심 가 치		소통과 공감의 고객중심	친환경을 위한 미래지향	지역을 향한 상생협력	글로벌 지향 인재양성
2022경영목표		공공주도 육해상풍력 발전사업 추진	발전시설 가동률 92% 이상 달성	무재해 달성	사회적가치지수 ‘우수등급’달성

전략목표		전략과제
에너지 공공자원 효율적 관리		❍ 공공주도 육·해상풍력 신속한 사업 추진 ❍ 공공사업 적극 추진 ❍ 발전설비 효율성 및 기술력 강화
미래성장동력 확보		❍ 미래대비 신성장동력 지속발굴 ❍ 스마트에너지시티 사업 추진 ❍ 에너지분야 연구‧기획역량 강화
사회적 가치 실현		❍ 동반성장 생태계 강화 및 일자리 창출 확대 ❍ 친환경·안전 활동 강화 ❍ 도민 참여 에너지거버넌스 확대
미래대비 조직경쟁력 강화		❍ 조직역량 강화 및 성과 창출 제고 ❍ 청렴하고 투명한 조직 운영 ❍ 성장기반 조직문화 확대

Ⅲ. 2022년 주요업무 계획

1.	현장중심 경영으로 공공주도 풍력사업 적기 착수
2.	빅데이터 기반 운영시스템 도입으로 기술 고도화
3.	중대재해 예방 제주에너지공사 안전보건관리체계 강화
4.	제주형 분산에너지 사업 모델 발굴 및 출력제어 해소
5.	도내 수소경제 활성화 선도 그린수소 사이트 구축
6.	재생에너지 출력제한(Curtailment)을 이용한 P2Heat 기술개발
7.	신재생에너지 융복합 전기차 충전 인프라 구축 · 추진(대행)
8.	전기차 충전 인프라 구축 및 운영 확대(대행)
9.	태양광발전설비 안정적 보급(대행)
10.	공기업의 사회적 책임 이행으로 지역경제 활성화 기여

1		현장중심 경영으로 공공주도 풍력사업 적기 착수

❍ 공공주도 해상풍력 첫 모델 가시화를 위한 사업 시행 단계 진입

추진목표	·(한동·평대) 사업자 공모 시행 및 사업자 선정(105MW급) ·(월정·행원) 해상풍력 사업지구 기초설계 및 지구지정 신청(100MW급 이상) ·(행원·보롬왓) 사업자 공모 시행 및 우선협상대상자 선정 ·(신규 풍력 실증단지 구축) 공사 발주 및 안전관리 ·(동복풍력 확장) 주민수용성 확보 및 사업타당성 용역 시행

❍ 풍력발전의 공공적 관리와 개발이익 공유화로 유치마을, 도민, 지역경제 활성화 및 지방재정 재투자

➊ 공공주도 한동·평대 해상풍력 사업 적기 추진 (계속)

□ 추진개요

❍ 사업기간: (개발) ‵16. 1. ~ ‵24. 2. (건설) ‵24. 3. ~ ‵26. 8.

❍ 사업위치: 제주시 구좌읍 한동리·평대리 일원(해상)

❍ 총사업비: 약 5,900억원

❍ 사업규모: 105㎿급

□ 추진상황

❍ 환경영향평가서 협의내용 도의회 동의 완료: ‵21. 12.

❍ 해상교통안전진단 심사위원회 심사 완료: ‵22. 2.

❍ 개발사업 시행승인 신청기한 연장(5차) 완료: ‵22. 3.

❍ 사업자 공모지침서(안) 수립: ‵22. 6.

❍ 마을별 해역규모 확정 및 마을 숙원사업 회신: ‵22. 6.

□ 추진계획

❍ 사업자 선정 道 사전협의 및 사업자 공모 시행: ‵22. 7. ~ 9.

❍ 사업자 공모 발주 및 우선협상대상자 선정: ‵22. 10. ~ ‵22. 12.

❍ 우선협상대상자 협상 및 사업시행협약 체결: ‵23. 1. ~ 2.

❍ SPC 설립 및 상세설계, 개발사업 시행승인: ‵23. 3. ~ ‵24. 2.

❍ 건설공사(30개월) 및 상업운전(20년): ‵24. 3. ~ ‵46. 8.

➋ 월정·행원 해상풍력 사업지구 발전단지 조성사업

□ 추진개요

❍ 사업기간: (개발) ‵16. 1. ~ ‵25. 12. (건설) ‵26. 1. ~ ‵28. 6.

❍ 사업위치: 제주시 구좌읍 월정·행원리 일원(해상)

❍ 총사업비: 약 6,000억원 이상  ※ 상세설계 후 확정 예정

❍ 사업규모: 100㎿급 이상

□ 추진상황

❍ 사업추진을 위한 주민수용성 및 변전소 부지 점검: ‵22. 2. ~‵22. 3.

❍ 마을 간 이견(행원리 변전소 부지 제공에 대한 임대료 요구)      발생에 따른 법률자문 의뢰 및 결과 접수: ‵22. 3. ~‵22. 4.

- (법률자문 내용) 후보지 공모서 신청자격 상실에 따른 후보지      취소 사유 해당

❍ 사업추진 관련 최종마을 의견 회신 요청 및 접수: ‵22. 5. ~‵22. 6.

- 회신내용: (월정리) 사업 무산(행원리) 양 마을 협의 불가로 무산

향후 신규공모 시 단독 신청

□ 추진계획

❍ 공사 이사회 보고 완료: ‵22. 7.

❍ 풍력발전지구 후보지 취소 통보: ‵22. 7.

❍ 道정책(3차 풍력발전종합관리계획, 사업시행예정자 연장) 등 대내․외 상황 및 여건을 고려하여 해상풍력 후보지 마을 공모 준비

➌ 행원·보롬왓 육상풍력 착수(21MW) (계속)

□ 추진개요

❍ 사업기간: (개발) ‵16. 1. ~ ‵23. 6. (건설) ‵23. 7. ~ ‵24. 6.

❍ 사업위치: 제주특별자치도 구좌읍 행원리 산 30번지 일원

❍ 총사업비: 약 660억원

❍ 사업규모: 21MW(4.2MW급 풍력발전기 5기)

□ 추진상황

❍ 풍력발전지구 지정 고시: ΄21. 4.

❍ 소규모환경영향평가 및 재해영향성검토(행정단계) 협의 완료: ΄21. 9. ~ 12.

❍ 도시계획위원회 심의(결과: 재심의): ΄22. 1.

※ 심의 의견: 주민수용성 극복을 위한 구체적인 추진사항 및 내용을 제시할 것

❍ 道 감사위원회 민원 청구 사항 조사 완료: ΄22. 4.

- 민원인 조사 결과 불복에 따른 재조사 청구(조사 기한: ΄22. 7. 6.)

□ 추진계획

❍ 도시계획위원회 심의 및 도시계획시설 결정 고시: ‵22. 7.

❍ 사업자 공모, 특수목적법인 설립 및 사업시행협약 체결: ~ ‵23. 3.

❍ 전기사업허가 및 개발사업시행 승인: ‵23. 6.

❍ 건설공사 착공 및 준공: ‵23. 7. ~ ‵24. 6.

➍ 국산 신규 풍력설비 실증단지 추진 (계속)

□ 추진개요

❍ 사업기간: ‵20. 10. ~ ‵22. 9.

❍ 사업위치: 제주시 구좌읍 행원리 24-7번지

❍ 사 업 비: 약 59.5억원(국비 35억, 민간 24.5억)

❍ 실증규모: 4.2MW급 풍력발전기 1기

□ 추진상황

❍ 전기사업허가 완료: ‵21. 12.

❍ 개발사업시행승인 완료: ‵22. 3.

❍ 공유수면점사용 실시계획 인가 및 공사 착공: ‵22. 4.

□ 추진내용

❍ 풍력발전기 설치 및 상업(실증)운전 개시: ~‵22. 12.

- 참여기관의 적극적인 협업으로 안전사고 방지를 위한 안전관리 철저

- 안전보건협의체 구성 및 운영, 전력 판매를 수행하기 위한 절차 이행

➎ 동복풍력 발전단지 확장 추진(16.8MW) (신규)

□ 추진개요

❍ 사업기간: (개발) ‵21. 12. ~ ‵24. 12. (건설) ‵24. 1. ~ ‵25. 12.

❍ 사업위치: 제주시 구좌읍 동복리 산 56번지(공유지) 일대

❍ 총사업비: 약 414억원

❍ 사업규모: 13.2MW~16.8MW(기존 시설: 30MW)

※ 국산 풍력발전기 모델(3.3MW급, 4.2MW급)에 따라 시설용량이 다름

□ 추진상황

❍ 동복풍력발전단지 확장 조성 사업계획 수립: ‵21. 12.

❍ 주민수용성 확보 추진: ‵22. 1. ~ ‵22. 5.

- 동복리 주민대상 사업설명회 6회 실시 완료: ‵22. 1. ~ ‵22. 4.

- 마을총회 동복풍력 확장사업 승인(원안 의결): ‵22. 4.

- 마을총회 결과(회의록, 참석자 명단 포함) 공문 접수: ‵21. 5.

❍ 사업타당성 검토용역 실시: ‵22. 3. ~ ‵22. 11.(진행중)

- 지방공기업평가원의 타당성용역 결과에 따라 JECO 내부투자심의위원회 검토를 통해 사업추진 방향 결정

□ 추진계획

❍ 도의회 보고, 공사채 발행 승인 및 자금 조달: ~ ‵23. 1.

❍ 공유재산 대부 등 토지사용권(공유재산) 확보: ~ ‵23. 4.

❍ 행정계획 변경: ~ ‵24. 6.

- 풍력발전지구 지정 및 도시계획시설 결정 등 행정계획 변경

❍ 개발사업시행승인 및 전기사업허가 변경: ~ ‵24. 12.

❍ 건설 및 상업운전 개시: ~ ‵25. 12.

2		빅데이터 기반 운영시스템 도입으로 기술 고도화

추진목표	·(통합운영관리 플랫폼 구축) 플랫폼 개발 국책과제 수행 ·(고도화된 관리체계 구축) 모니터링-고장분석-자재수급의 체계 마련

❍ 빅데이터 기반 감시·운영·통계“One Stop 통합모니터링”시스템 구축

□ 추진개요

❍ 사업기간: ‵21. 9. ~ ‵22. 12.

❍ 실증규모: 제주에너지공사 풍력발전단지 5개소(56.83MW, 40기)

❍ 주요내용

- 발전단지에서 생성되는 빅데이터(풍향, 풍속, 발전량, SMP, 정지 원인, 자재사용 이력 등) 원스톱 통합관리 및 고장 분석으로 고장 대응력 강화

- 고장대응력 강화를 위한 발전단지 운영실적 및 고장유형 실시간 분석으로 예방점검 확대 및 적기 자재 수급

□ 추진단계

1단계 (2018. 12월 완료)		2단계 (2021. 9. ~ 2022. 12.)		3단계 (2023. 1. ~ )
통합모니터링 구축 각 풍력발전기 스카다 통합감시 체계 구축	▶	통합모니터링 운영관리 시스템 구축 점검‧안전, 자재, 통계 원스톱 관리 체계 구축	▶	지능형 통합운영관리 시스템 구축 최적 유지보수 솔루션 체계 구축, 운영실적 분석‧예측 고도화

□ 추진상황

❍ 풍력발전설비 자재 예비율 관리 기준 수립: ~ ‵21. 12.

❍ 6개년 발전단지 고장유형 분석 및 예방점검 확대 기준 마련 ~ ‵22. 4.

❍ 발전단지 감시/운영/자재/통계 부문별 시스템 구축 협의: ~ ‵22. 6.

❍ 발전단지 일일 보고 보완 및 시스템화 협의: ~ ‵22. 6.

□ 추진계획

❍ 시스템 도입 전 보안성 검토: ~ ‵22. 7.

❍ 풍력발전설비 고장예측 및 예방시스템 구축 개발 협의: ‵22. 8. ~ 12.

❍ 통합모니터링 운영관리 플랫폼 실증 및 보완: ‵22. 8. ~ 12.

3		중대재해 예방 제주에너지공사 안전보건관리체계 강화 (신규)

❍「중대재해 처벌 등에 관한 법률」시행에 따른 안전보건경영체계 구축 및 운영

추진목표	·(안전보건관리 추진체계 구축) 매뉴얼 및 세부지침 마련 ·(발전단지 재난대응 훈련) 모의훈련 및 유관기관 합동훈련(1회/반기)

❍ 체계적인 안전보건관리를 통한 임직원, 협력업체 근로자의 생명보호 및 안전 확보

□ 추진개요

❍ 사업기간: ‵22. 1. ~ ‵22. 12.

❍ 예산규모: 6.5억원(전년대비 8.2%, 49,000천원 증가)

❍ 주요내용

- 중대재해 예방 중심의 효율적인 안전보건관리 추진

- 안전보건관리 전담조직 구성 및 안전보건경영체계 구축을 통한 안전보건관리체계 확립

□ 추진상황

❍ 상반기 발전단지 재난대응 훈련 실시: ‵22. 4.

- 상황별 위험시설을 대상으로 모의훈련 실시

- 협력업체, 소방서 등 유관기관과의 합동훈련 실시

❍ 중대재해 예방 안전보건관리체계 고도화: ~ ‵22. 6.

- 중대재해처벌법을 반영한 안전보건관리계획 수립 및 이행

- CEO를 포함한 관리감독자, 근로자 안전보건교육 실시

- 중대재해처벌법 핵심요소를 반영한 안전보건 지침 마련(9건)

❍ 쾌적하고 안전한 근무환경 구축: ~ ‵22. 12.

- 정기안전점검 12회 실시(매월 2회 실시)

- 정기안전점검(6회) 및 우리회사주치의(1회) 실시

□ 추진계획

❍ 중대재해 예방 안전보건관리체계 고도화: ~ ‵22. 7.

- 임직원 및 공사/용역사 대상 안전보건교육 실시로 안전 사업장 조성

- 안전보건관리체계 확립을 위한 매뉴얼 및 세부지침 마련

❍ 제주에너지공사 기능연속성계획 수립: ~ ‵22. 10.

- 재난 및 안전관리 기본법 제25조의2에 따라 재난 발생 시 기관의 핵심 기능 유지를 위한 기능연속성계획 수립

❍ 하반기 발전단지 재난대응 훈련 실시: ~ ‵22. 12.

- 상황별 위험시설을 대상으로 모의 훈련 실시

- 협력업체, 소방서 등 유관기관과의 합동 훈련 실시

❍ 쾌적하고 안전한 근무환경 구축: ~ ‵22. 12.

- 정기적 방역을 통한 감염병 예방(코로나19 소독, 해충 방역)

- 매월 안전보건점검을 통한 임직원의 건강 및 안전 확보

4		제주형 분산에너지 사업 모델 발굴 및 출력제어 해소

❍ 분산에너지로의 패러다임 전환에 따라 新전략시장을 대비하여 제주형 분산에너지 사업 모델을 발굴하고 출력제어 완화와 잉여전력을 활용한 신사업 확대

추진목표	·(대규모 ESS 구축) 도내 출력제약 약 75% 완화 ·(실증단지 구축) 재사용 배터리 등 다양한 배터리 모델 실증

□ 추진개요

❍ 사업명: (민관 합동)제주 대규모 ESS 실증단지 구축

- 사업기간: ‵22. 9. ~ ‵24. 3.(예정)  ※ 운영기간 준공 후 15년

- 총사업비: 약 1,000억원(PCS 60MW, BAT 240MWh급)

❍ 주요내용

- 전력시장운영규칙 개정 등 제도개선을 통한 사업성 확보

- 민간투자(발전공기업, 배터리제작사 등) 유치를 통해 민‧관‧공 합동사업 추진

- 재사용, 폐배터리 등 실증용 사이트 구축을 통한 배터리 모델 실증 및 안정성 검토

※ EV 배터리 재사용‧재활용, 바나듐배터리 등 장주기 배터리 실증추진

□ 추진상황

❍ 전력시장운영규칙 제도개선을 위한 의견 제출 : ‵22. 4월

❍ 사업추진 추진을 위한 지속 논의 중(산업부, 도, 전력거래소)

□ 추진계획

❍ 전력시장운영규칙 및 비용평가규정 개정 : ‵22. 7월

- 공사에서 ‵21. 6월(1차), ‵22. 4월(2차) 제도개선 건의로 규칙 개정 중

❍ ESS 사업예정자 공모(산업부) 및 신청(공사 → 산업부) : ‵22. 9월

❍ 사업예정자 지위 확보 및 민간투자자 공모 추진 : ‵22. 10월

❍ 특수목적법인 설립절차 이행 및 전기사업허가 신청 : ‵22. 12월 ~

5		도내 수소경제 활성화 선도 그린수소 사이트 구축 (R&D)

❍ 그린수소에 대한 실증 연구로 도의 신재생에너지 수용 능력 확대 및 수소경제 활성화 도모

추진목표	·(국내 최초 신재생E 연계) 그린수소 생산 사이트 확보 ·(수소 분야 신기술 개발) 제주 주도의 수소 분야 신기술 개발 및 활용

❍ 신재생에너지 보급 확대와 제주지역 계통한계에 따른 발전 출력 제약 및 미활용 전력 발생에 대한 대응책 마련

➊ 3MW 그린수소 생산 및 저장 기술개발 사업(R&D)

□ 추진개요

❍ 사업명: (산업부)재생에너지 연계 그린수소 생산 기술을 활용한 수소(600kg) 및 배터리(2MWh) 저장 시스템 기술개발 및 실증

❍ 사업기간: ‵20. 10. ~ ‵23. 4. / 31개월

❍ 총사업비: 204억원[국비 135억 + 민간 69억(현금 22억 + 현물 47억)]

❍ 주관/참여기관: 제주에너지공사 / 제주도 외 9개 기관

❍ 주요내용

- 국내최초 MW(3MW)급 수전해 시스템 설계, 구축 및 실증

- 그린수소(600kg) 생산 및 배터리(2MWh) 저장 시스템 구축 및 실증

- 그린수소 생산, 저장시스템 실증 및 운영을 통한 국민 수용성 제고

□ 추진상황

❍ 도시관리계획 최종 결정고시: ‵22. 3

❍ 건축신고 승인: ‵22. 6

❍ 수소 생산시설 토목 건축 공사 착공: ‵22. 6

□ 추진계획

❍ 수소 생산시설 토목공사: ~ ‵22. 10.

❍ 수소 생산시설 전기공사: ‵22. 7. ~ ‵22. 11.

❍ 유틸리티(기계설비/통신/소방) 연계 공사: ‵22. 10. ~ ‵22. 12.

❍ 수소 생산 및 실증·운영 실시: ‵22. 12. ~

➋ 12.5MW 재생에너지 연계 대규모 그린수소 개발 사업 (R&D)

□ 추진개요

❍ 사업명: (산업부)12.5MW 재생에너지 연계 대규모 그린수소 개발 사업

❍ 사업기간: ‵22. 4. ~ ‵26. 3.(48개월)

❍ 총사업비: 약 620억원(국비: 296억원, 민간: 324억원)

❍ 주관/참여기관: 한국남부발전/제주에너지공사, 제주특별자치도 외 11개 기관

❍ 주요내용

- 국내 최대 12.5MW급, 국내외 타입별(4type) 수전해 설비 설치와 운영

- 新전력시장 요금제도(PPA, 플러스DR 등) 활용한 그린수소 생산  및 상용화를 위한 경제성 확보 방안 마련

- 도내 친환경(수소) 상용차 전환 및 보급 교두보 마련

□ 추진상황

❍ ‵22년 상반기 에너지기술개발사업 신규과제 신청 및 평가: ‵22. 2. ~ 4.

❍ 최종 연구개발계획서 제출: ‵22. 5.

❍ 연구과제 협약 체결: ‵22. 6.

□ 추진계획

❍ 사업부지 선정 및 주민수용성 확보: ~‵22. 12.

- 도유지, 공사부지 중 활용성, 주민수용성 등을 검토, 마을 의견을 수렴하여 사업부지 선정

❍ 인허가 확보 및 설비 구축 완료: ~‵24. 12.

- 부지, 고압가스, 건축 등 인허가 확보(~‵23. 12.) 후 토목/건축 및 설비별 구축 공사 실시

❍ 수소생산-수송-공급 체인 중 공사 역할 및 수익 확보 방안 마련: ~‵25. 12.

- 국책과제 종료 후 운영관리 기술력 확보 및 위탁 수익 창출

❍ 그린수소 생산을 활용하여 도내 상용차를 수소차로 전환: ~‵26. 3.

- 연간 약 1,200톤의 수소 생산을 통한 수소버스/청소차 충전

6		재생에너지 출력제한(Curtailment)을 이용한 P2Heat 기술개발

❍ P2H사업 발굴 및 추진으로 제주도 신재생에너지 미활용 전력 발생 문제 해결 방안 마련 및 분산에너지 특구 지정 기여

❍ 재생에너지 출력제한 완화로 온실가스 감축 및 신사업 확대

추진목표	·(비즈니스모델 개발) 플러스DR 연계한 P2H 비즈니스 모델 개발 ·(구축 및 실증) 도내 공공기관 등 실증사이트 4개소 운영 및 실증

□ 추진개요

❍ 사 업 명: 재생에너지 출력제한(Curtailment)을 이용한 P2Heat 기술개발

❍ 사업기간: ‵22. 4. ~ ‵25. 12. / 45개월

❍ 총사업비: 118억원[국비 92억 + 민간 26억(현금 18억 + 현물 8억)

❍ 주요내용

- 기존 화석연료 에너지를 전기에너지로 전환(P2Heat) 기술개발

·고밀도 열저장 시스템 개발 및 고효율 열공급시스템 구축

- 출력제한 예측정보 연계 열이용 시뮬레이터 개발

·맞춤형 기상예측 및 출력제어량 모듈 개발

- 출력제한 활용 플러스 DR 플랫폼 구축 및 P2H 시스템 이용

- 도내 공공기관 등 실증사이트 4개소 운영 및 실증

·의료시설 1,055kW(300RT*), 온실하우스 300kW(100RT), 수영장 300kW(100RT), 숙박시설 300kW(100RT)

*RT(Refrigeration Ton, 냉동톤): 단위시간당 냉각열량(kcal/h), 1kW=0.2843RT

□ 추진상황

❍ ‵22년 상반기 에너지기술개발사업 신규과제 신청 및 평가: ‵22. 3

❍ 연구과제 협약 체결: ‵22. 5.

□ 추진계획

❍ 실증후보지 설계 및 구축: ‵22. 5월~

- 의료시설, 농업시설(‵22년~‵23년), 체육시설(‵23년), 관광시설(‵24년)

❍ 재생에너지 출력제한을 이용한 P2Heat 기술 개발 및 실증과 플러스DR 플랫폼 구축

7		신재생에너지 융복합 전기차 충전인프라 구축·추진 (대행)

❍ 신재생e를 활용한 EV 충전으로 증가하는 도내 충전 수요 충당

❍ 융복합EV충전스테이션 구축사업을 통한 사업성 검증 및 도민과

추진목표	·(사업비 투자 유치) 민간투자기업 투자 유치 10억원 이상 ·(사업성 검증, 도민 상생방안 마련) 융복합EV충전스테이션 2개소 구축

상생 방안 마련으로 공사 주도의 신사업 모델 발굴

□ 추진개요

❍ 사업기간: ‵22. 4. ~ ‵22. 12.

❍ 총사업비: 30억원 이상(국비 10억, 도비 10억, 민간투자 10억)

(사업)연도	사업비 (백만원)	주요내용
(1차)′19년	1,000	태양광발전 → ESS → 전기차 충전 기술 실증
(2차)′20년	1,460
(3차)′21년	3,000	규제 특례 활용 전력거래 제도 실증
(4차)′22년	3,000	사업성 및 도민과의 상생 방안 실증

※ 3, 4차 사업비는 민간투자금 10억이 포함됨

❍ 주요내용: 융복합EV충전스테이션 2개소 구축

※ 태양광발전 200kW 이상, ESS 600kW 이상, EV충전기 20기 이상 설치

□ 추진상황

❍ 사업계획 승인(도→공사): ‵22. 6.

❍ 도 대행협약 내 부속합의 체결(도↔공사): ‵22. 6.

※ 도: 본 사업의 권리와 책임을 갖음 / 공사: 도의 명의로 공모, 민간투자 유치 등 수행

□ 추진계획

- 사업시행기업 모집 공모 공고 및 사업설명회: ~‵22. 7.

- 공모 선정평가 및 협상대상자 선정: ~‵22. 8.

- 협상 및 실시협약 체결: ~‵22. 8.

- 설계, 전기공사 등 구축: ‵22. 8. ~ 12.

- 시운전 및 준공: ‵22. 12.

8		전기차 충전인프라 구축 및 운영 확대 (대행)

❍ 전기차 충전기설치, 유지 관리 등 전기차 충전 인프라를 확대하여 전기자동차 보급 촉진 및 이용 만족도 제고

추진목표	·(EV 충전인프라 확대) 개방형 충전기 7기 구축 ·(EV 충전인프라 개선) 충전기 612기 연 4회 점검(정기, 하자점검)

❍ 체계적인 유지 관리로 도민에게 안전하고 편리한 충전환경 제공

□ 추진개요

❍ 사업기간: ‵22. 1. ~ ‵22. 12.

❍ 총사업비: 23.1억원

❍ 주요내용

- 수요조사를 통한 충전기 총 7기 신규 설치 및 2기 이설

※ 교통약자 맞춤형 충전기 6기(신규5, 이설1), 전기버스 충전기 3기(신규2, 이설1)

- 개방형 충전기 총 612기 통합운영 및 운영플랫폼 유지관리

※ 관리 충전기: 급속 112기, 교통약자 234기, 완속 245기, 전기버스 21기

□ 추진상황

❍ 전기버스 개방형 충전기 구축사업

- 구축대상지 수요조사 및 선정: ~‵22. 5.

- 대상지 현장답사 및 실시설계 용역: ‵22. 5.~

- EV충전기 대행사업 관련 사업설명회 개최: ‵22. 6.

- 급속충전기(300㎾) 1기 이설 전기공사/감리: ‵22. 6.~

❍ 전기자동차 개방형 충전기 구축사업

- 구축대상지 수요조사 및 선정: ~‵22. 5.

- 대상지 현장답사 및 실시설계 용역: ‵22. 5.~

- EV충전기 대행사업 관련 사업설명회 개최: ‵22. 6.

※ 설명회를 통해 사업 추진계획 및 충전기 입찰참가자격 기준 등 사전 안내

❍ 도 구축 개방형 충전기 통합운영관리

- 충전기 공공운영비(전기요금, 통신요금 등) 납부: ‵22. 1. ~ 6.

- 충전기 운영 및 고장 대응: ‵22. 1. ~ 6.

- 충전기 전기안전관리대행 용역: ‵22. 1. ~ 6.

- 충전기 유료운영(정산용역) 및 운영 플랫폼 유지관리: ‵22. 1. ~ 6.

- 충전기 유지보수 용역 시행: ‵22. 1. ~ 6.

- 상반기 충전기 정기점검 실시 및 완료: ‵22. 6.

□ 추진계획

❍ 전기버스 개방형 충전기 구축사업

- 전기버스 급속충전기(300㎾) 1기 이설 전기공사: ~‵22. 9.

- 전기버스 급속충전기 설치 전기공사 실시설계 용역: ~‵22. 7.

- 전기버스 급속충전기(200㎾) 2기 구매 및 설치: ‵22. 7. ~ 12.

- 미비사항 조치 및 사업 정산: ‵22. 12.

❍ 전기자동차 개방형 충전기 구축사업

- 급속충전기(교통약자) 설치 전기공사 실시설계 용역: ~‵22. 7.

- 급속충전기(교통약자) 5기 구매 및 설치: ‵22. 7. ~ 12.

- 미비사항 조치 및 사업 정산: ‵22. 12.

❍ 도 구축 개방형 충전기 통합운영관리

- 충전기 공공운영비(전기요금, 통신요금 등) 납부: ‵22. 7. ~ 12.

- 충전기 운영 및 고장 대응: ‵22. 7. ~ 12.

- 충전기 전기안전관리대행 용역: ‵22. 7. ~ 12.

- 충전기 유료운영(정산용역) 및 운영 플랫폼 유지관리: ‵22. 7. ~ 12.

- 충전기 유지보수 용역 완료: ‵22. 7. ~ 12.

- 충전기 하자검사(상/하반기) 완료: ‵22. 7.(상반기), ‵22. 12.(하반기)

- 하반기 충전기 정기점검 완료: ‵22. 11.

- 미비사항 조치 및 사업 정산: ‵22. 12.

9		태양광발전설비 안정적 보급 (대행)

❍ 지역주민이 공동으로 이용하는 마을회관, 부녀회관 등에 태양광설비를 지원하여 에너지 비용 경감을 통해 도민에게 에너지 복지 제공

추진목표	·(태양광 보급 확대) 마을공동이용시설 태양광 설비 50kW 보급 ·(태양광 운영 활성화) 마을공동이용시설 25개소 고장 수리 ·(찾아가는 서비스 제공) 마을공동이용시설 태양광발전설비 200개소 전수조사

□ 추진개요

❍ 사업기간: ‵22. 1. ~ ‵22. 12.

❍ 총사업비: 2억원

❍ 사업규모: 5kW급 태양광발전 10개소 설치, 25개소 고장수리지원

❍ 주요내용

- 마을공동이용시설에 5㎾ 이하 태양광발전설비 설치 지원

- 기 설치된 마을공동이용시설 태양광발전설비 고장 수리 지원

※ 마을별 고장 수리 요청 건 및 전수조사에서 발견한 고장에 대한 무상수리 지원

- 대정, 안덕, 서귀포 마을공동이용시설 태양광설비 전수조사(2차)

※ ‵21년도 1차 전수조사: 총 252개소(애월, 한림, 한경) 현장점검 완료

□ 추진상황

❍ 마을공동이용시설 태양광 수요조사(설치/고장수리): ~‵22. 5.

❍ 보급사업 지침 수립 및 전문기업 모집: ‵22. 6. ※ 도내 2개 기업

□ 추진계획

❍ 보급사업 전문기업 최종 선정 및 업무협약: ‵22. 7.

❍ 태양광 지원신청 접수 및 승인: ~‵22. 8.

❍ 태양광설비 설치·고장 수리 및 지원금 지급: ‵22. 8. ~ 12.

❍ 마을공동이용시설 태양광 전수조사(3개 권역): ~‵22. 11.

※ 대상: 1차 대정읍, 2차 안덕면, 3차 서귀포시내 / 총 200개소 조사 예정

10		공기업의 사회적 책임이행으로 지역경제 활성화 기여 (계속)

❍ 장애인, 경력단절여성 등 취약계층 대상 양질의 공공 일자리 창출 모델을 발굴하고 공공구매 활성화를 통한 지역경제 활성화 도모

추진목표	·(사회형평적 채용 실시) 장애인, 경력단절여성 등 채용 2회 ·(청년 일성장프로그램) 공사 체험형 청년인턴 운영 2회 ·(공공구매 추진) 인식개선 교육 3회, 실적관리 전산화

❍ 지방공기업 직무 체험을 통한 도내 청년 채용 경쟁력 강화와 도내 일자리 창출에 기여

□ 추진방향

❍ 코로나19 장기화 등에 따라 취업에 어려움을 겪고 있는 취업 취약계층을 대상으로 사회형평적 채용 실시

❍ 제주지역 청년들을 대상으로 직무수행 능력 및 적응력 배양을 위한 지방공기업 직무 체험 기회 제공

❍ 도내 공공구매 적극 참여를 통해 지역상생 협력 강화

□ 추진상황

❍ 저탄소정책사업 지원인력 사회형평적 채용(고령자) 진행 중

- 임용: 7월 중(예정)

❍“청년 일성장프로그램”참여: 1명(5월 ~ 10월)

❍ 상반기 체험형 청년인턴 운영: 2명(7월 ~ 10월)

□ 추진계획

❍ 사회형평적(장애인, 경력단절여성 등) 채용( ~ 10월)

❍ 하반기 공사 체험형 청년인턴 운영(22년 11월 ~ 23년 2월)

❍ 도내 공공구매 적극 추진

- 공공구매 교육 실시(내부교육 2, 온라인 1)로 조직 내 인식 개선

- 실적관리 전산화를 통해 월별 실적 공유