제407회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2022년 주요 업무 보고

2022. 7.

(상하수도본부)

보고순서

	Ⅰ	일반현황
	Ⅱ	정책목표와 전략
	Ⅲ Ⅲ	2022년 주요업무 계획

Ⅰ. 일반현황

Ⅰ. 일반현황

1		기구 및 정‧현원

❋ 기 구 : 2부, 1단, 9과

																		상하수도본부
																상수도부										하수도부									공공하수처리시설현대화사업추진단
		경영관리과														상수도정책시설과 상수도생산관리과 누수방지과										하수계획과 하수시설과 제주하수운영과 서귀포하수운영과									총괄과

❋ 인 력 : 정원 280명 / 현원 259명

('22. 7. 1. 기준)

구 분	총계	일 반 직									청원 경찰	공무직
		계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구직
정 원	280	177	1	3	9	46	38	48	26	6	28	75
현 원	259	166	1	3	8	51	59	22	14	8	22	71
과부족	△21	△11			△1	5	21	△26	△12	2	△6	△4

2		주 요 기 능

경영관리과

□ 본부 소관 행정의 종합 기획 조정

□ 상․하수도 공기업 특별회계 예․결산, 회계, 자산관리 업무

□ 공기업 경영분석 및 경영합리화에 관한 업무

□ 직원복무, 교육, 복리후생 등에 관한 사항

상수도부

□ 상수도 생산․공급 행정의 종합 기획 및 조정

□ 식수원 개발 및 상수도공급계획 수립□시행

□ 취□정수시설 운영 및 먹는 물의 수질관리

□ 유수율 향상 대책 수립 및 누수방지사업 시행

하수도부

□ 중장기 하수도 기본정책 수립 및 추진

□ 광역 하수도정비 기본계획 수립

□ 하수처리장 건설, 하수관로 및 마을하수도시설사업 추진

□ 하수처리장 및 위생처리장 운영관리

공공하수처리시설 현대화사업추진단

□ 제주(도두) 공공하수처리시설 현대화사업 종합 기획 및 조정

□ 제주(도두) 공공하수처리시설 현대화사업 시행

□ 제주(도두) 공공하수처리시설 주변지역 마을발전사업 추진

□ 제주(도두) 공공하수처리시설 운영관리

3		재 정 현 황

� 예산규모 : 4,313억원

(단위: 억 원)

구 분	’22년도	’21년도	증 감	’22년 주요내역
합 계	4,313	3,709	증 604 (증16.3%)
상수도사업 공기업 특별회계	1,740	1,574	증 166 (증10.5%)	세입	사 용 료 755 부 담 금 67 국고보조 238 유보자금 38 전 입 금 141 차 입 금 389 기 타 112
				세출	필수경비 738 균특이양 88 국고사업 418 자산취득 11 자체사업 471 예 비 비 14
하수도사업 공기업 특별회계	2,573	2,135	증 438 (증20.5%)	세입	사 용 료 596 부 담 금 124 국고보조 549 유보자금 222 전 입 금 657 차 입 금 411 기 타 14
				세출	필수경비 978 민간자본보조 102 국고사업 1,161 자산취득 등 17 자체사업 296 예 비 비 19

� 자산 ․ 부채('21년 결산기준)

□ 자  산 : 24,269억원

(단위: 억 원)

구 분	합 계	상수도분야	하수도분야
계	24,269	7,423	16,846
토지	393	183	210
건물	407	83	324
구축물 등	23,469	7,157	16,312

□ 부  채 : 총 6,565억원

(단위: 억 원)

구 분	총부채액
	합 계	차입금	BTL
계	6,565	2,828	3,737
상수도	845	845
하수도	5,720	1,983	3,737

4		기 타 현 황 자 료

*환경부 승인 전 통계

� 상수도공급

(’21.12.31. 기준)

구 분	시설용량 (톤/일)	연간 총 급수량(천톤)	1일 평균 급수량(톤)	연간 총 사용량(천톤)	1인 1일 사용량(ℓ)
’20년	533,902	167,754	459,600	81,938	320.9
’21년	533,902	164,145	449,711	85,036	334

※ 연간총사용량은 요금부과량 임

� 정수시설

(’21.12.31. 기준 / 단위: ㎥/일)

구 분	정 수 시 설 별 현 황
	계	정수장	지하수	담수장	저수지	용천수
합 계	533,902	343,500 (17개소)	190,402 (308공)	(2개소)	(6개소)	(9개소)
광 역 상수도	223,000	223,000 (10개소)	(138공)	-	(2개소)	-
지 방 상수도	120,500	120,500 (7개소)	-	-	(4개소)	(9개소)
마 을 상수도	190,402	-	190,402 (170공)	(2개소)	-	-

※ 예비취수원(지하수 75개공, 84,963㎥/일) : 광역상수도(27공, 29,290㎥/일), 지방상수도(14공, 23,550㎥/일), 마을상수도(34공, 32,123㎥/일)

� 상수관로

□ 관로별

(’21.12.31. 기준 / 단위: ㎞)

구 분	총연장	도수관	송수관	배수관	급수관
합 계	6,316	108	473	4,252	1,483

□ 노후수도관(급수관 제외)

(’21.12.31. 기준 / 단위: ㎞)

도·송·배수관로	노후수도관	노후수도관 비율(%)
4,833	1,316	27.2%

※ ’21년 노후상수도관 정밀조사 용역 결과

� 하수도보급률

(’21.12.31. 기준)

구 분		계	제 주 시		서귀포시		비고
			동지역	읍면지역	동지역	읍면지역
인구 (명)	총 인 구	697,476	388,879	117,964	105,340	85,293
	처리인구	652,337	382,706	91,195	104,797	73,639
	보급률(%)	93.5%	98.4%	77.3%	99.5%	86.3%

� 하수처리장

(’22. 6.30. 기준)

시별	처리장명	시설용량 (톤/일)	처리공법	중계펌프장 (개소)	간이펌프장 (개소)	차집관로 (km)	비 고 (가동일)
계	8개소	258,000		122	520	373.1
제주시 (제주하수운영과)	제 주	130,000	MLE	15	135	54.8	’94. 3. 1.
	동 부	12,000	SBR	16	104	58.0	’07. 7. 1
	서 부	24,000	SBR	25	146	58.8	’07. 7. 1.
서귀포시 (서귀포하수운영과)	보 목	30,000	KSMBR	8	18	29.2	’96.12.30.
	색 달	23,000	AO Denipho	16	36	53.6	’83. 8.15.
	대 정	21,000	SBR MSBR	15	33	38.0	’05. 4. 1.
	남 원	8,000	SBR	10	20	49.3	’08. 1.31.
	성 산	10,000	SBR	17	28	31.4	’05. 4. 1.

� 하수발생 및 처리

(’22. 6.30. 기준)

구 분		시설용량 (톤/일)A	유입 처리량 (톤/일)B	처리율 (%)C=B/A	비 고
계		258,000	232,752	90.2
제주시	동지역	130,000	131,335	101.0
	읍면지역	36,000	36,340	100.9
서귀포시	동지역	53,000	34,997	66.0
	읍면지역	39,000	30,080	77.1

� 하수관로

(’21.12.31. 기준 / 단위: ㎞)

구 분	계획연장 (A)	시설연장			시설율(%) C=B/A
		총계(B)	합류식	분류식
합 계	5,505	4,434	197	4,237	80.5%

Ⅱ. 정책목표와 전략

Ⅱ. 정책목표와 전략

					상하수도본부
목표			안정적인 상·하수도 기반구축으로 도민 삶의 질 향상
전 략 과 제							실 행 계 획
상·하수도 공기업 경영개선 기반구축							▪ 투자수요에 대응한 상하수도 재원확충 ▪ 책임경영 구현을 위한 경영효율화 추진
수돗물 신뢰도 향상을 위한 ‘안전한 물 ’공급체계 구축							▪ 도민물복지 향상을 위한 건강한 수돗물 공급·관리체계구축 ▪ AI·ICT기반 미래형 상수도 공급체계 구축 ▪ 동지역블록구축 및 ICT를 활용한 유수율제고사업 추진
안전하고 쾌적한 하수처리 인프라 구축							▪ 안정적 하수처리를 위한 하수처리장 증설 ▪ 안정적 하수이송체계 구축을 위한 하수관로 정비 ▪ 하수처리시설 안정적 운영·관리 ▪ 제주공공하수처리시설 현대화사업 추진

Ⅲ. 2022년 주요업무 계획

Ⅲ. 2022년 주요업무 계획

1.	｢중대재해처벌법｣ 시행, 안전·보건조치 강화 등 선제적 대응
2.	상·하수도 공기업 지속적 경영개선 기반구축
3.	도민 물복지 향상을 위한 건강한 수돗물 공급·관리체계 구축
4.	미래형 상수도 공급체계 구축으로 안전한 수돗물 공급
5.	동지역 블록구축 및 ICT를 활용한 유수율 제고사업 추진
6.	안정적 하수처리를 위한 하수처리장 증설
7.	안정적 하수이송체계 구축을 위한 하수관로 정비
8.	청정제주 실현을 위한 제주공공하수처리시설 현대화사업 추진

1		「중대재해처벌법」시행, 안전·보건조치 강화 등 선제적 대응

❍ ｢중대재해처벌법｣시행(’22.1.27)에 따른 상하수도 시설물 및 종사자의 안전·보건조치 강화로 “중대산업재해” 예방 등 선제적 대응체계 구축

□ 시설현황

❍ (상수도) 576개소(정수장 17, 담수장 2, 취수원 383, 가압장 10, 배수지 164)

❍ (하수도) 714개소(하수처리장 8, 분뇨처리장 8, 펌프장 642, 사업장 등 56)

□ 추진상황

❍ (안전보건관리계획 수립) 시설별 환경여건에 맞춘 안전보건관리체계 구축(’22.1월)

❍ (재난대응체계 확립) 밀폐공간 작업 안전수칙 마련(’22.3월), 화학물질 관리계획 수립(’22.3월), 위험시 대응조치 매뉴얼 구축(’22.6월)

❍ (위기대응 도상훈련 실시) 모의사고 설정한 도상훈련을 통하여 사고 발생시 신속한 초동조치·협업체계 구축 등 위기대응 능력 확보(’22.3월)

❍ (안전점검의 날 운영) 부서별 안전점검 및 교육 시행 여부 등 확인(매월 4일)

❍ (시설물 안전점검) 상반기 정기안전점검(1‧2종 시설물 26개소), 내진성능평가(3개소), 소방시설 종합정밀점검 실시(8개소)

❍ (위험성 평가 후속조치) ’21년 하반기 위험성평가에 따른 위험요인 개선 조치(’22.2월)

❍ (재난안전관리자 및 근로자 교육) 재난안전관리자 교육(14시간), 근로자 정기안전 보건교육 실시(12시간)

❍ (도급사 안전교육) 도급사(상수도 19개사·하수도 41개사) 중대재해 예방교육 및 근로자 안전보건 교육 실시(3회)

□ 추진계획

❍ (위기대응 현장훈련) 소방관서‧협력업체 합동 위기대응 현장훈련 추진(분기 1회)

❍ (시설물 안전점검) 하반기 정기안전점검(1‧2종시설물 26개소), 정밀점검(7개소) 추진

❍ (작업환경 측정평가 및 특수건강검진) 수질검사실, 정수장‧하수처리장 작업환경 평가 및 야간근무직원(158명) 특수건강검진 추진(하반기)

❍ (위험성 평가) 상하수도본부 각 작업장별 위험성 평가 추진(하반기)

❍ (도급사 안전교육) 하반기 도급사 중대재해 예방교육 및 근로자 안전보건 교육

2		상·하수도 공기업 지속적 경영개선 기반구축

❍ 상‧하수도 재원확충과 자산·부채관리, 원가절감 등 경영효율 강화

❍ 지속적 제도개선·투명한 행정을 통한 건전재정 운영으로 도민 신뢰도 제고

□ 추진상황

❍ (재원확충) 국고보조금 등 투자재원 확보, 공공예금 관리, 원가절감 등

- (국고보조금) 국비사업 발굴 및 중앙절충(17회‧50건‧1,972억), 지방재정협의회 건의(2건‧100억)

- (공공예금관리) 집행잔액 등 유휴자금 예치로 이자세입 확충(반기별)

- (원가절감) 유수율 제고, 태양광․전력수요관리(동력비↓), 안전관리자 자체선임(인건비↓)

❍ (경영투명성 강화) 전문가 활용 결산 실시, 요금제도 정비로 법적 근거 강화

- (2021년 결산완료) 외부전문가 수행을 통해 결산의 정확성 제고(’22.1.~3./ 28백만원)

- (요금제도 정비) 사회환경 변화를 반영한 감면규정 등 정비

․국민기초생활수급자 요금감면·빗물이용시설 감면율 조정 등(’22. 하반기)

-  (고객만족도 조사) 친절행정 및 고객만족도 제고를 위한 설문 실시(’22.6월/ 93.6점)

❍ (경영효율화 제고) 중장기 경영관리계획 수립, 자산·부채관리 등

- (계획수립) ‘중장기 경영관리계획 수립용역’ 추진(’22.5.~8./ 18백만원, 한국수도경영연구소)

- (자산관리) ‘하수도 자산실사용역’ 추진(’22.5.~’23.1./ 165백만원, 동아송강회계법인)

- (부채관리) 부채규모 적정관리를 위한 적기상환(’22. 상반기 / 308억*)

* ’22년 차입금 상환액 : 666억(차입금 350억, BTL 316억), 상반기 308억·하반기 358억 상환

□ 추진계획

❍ (재원확충) 금리변동 반영 공공예금 적기 대응, 합리적 자산관리, 원가절감 등

❍ (조례개정) 조례규칙심의 등 절차이행(7~8월), 조례안 심의(9~10월), 시행규칙 개정(12월)

❍ (부채상환) 358억원(’22.12월/ 상수도 96억, 하수도 89억, BTL 173억)

3		도민 물복지 향상을 위한 건강한 수돗물 공급·관리체계 구축

❍ 미래 수요 대비 효율적 취수원 관리 체계 구축을 위한 시설확충 및 개선

❍ 취수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질검사·관리로 도민욕구 만족

□ 추진개요

❍ 2040년 목표 수도정비기본계획에 근거한 제주형 상수도행정 추진

❍ 미래 상수도 공급자원 보전을 위한 신규 지하수 개발 억제 및 최소화

❍ 771개 수질검사지점을 통한 연중 모니터링으로 수질안정성 확보

□ 추진상황

❍ (급수수요 증가 대비 취수원개발) 지하수 3호공, 송수관(7.5km) 개발 완료

❍ (원인자부담사업 상수도시설 확충) 상수관로(3.8km) 등 시설 확충

❍ (물절약 절수설비·절수기기 보급) 사회복지시설 13개소·202개(누적 22,294여개)

❍ (취수원, 정수장 등 수질검사) 총 7,560건(정수장, 수도꼭지, 공공음수대 등)

□ 추진계획

❍ (애월정수장 고도정수처리시설 사업추진) Q=23천㎥/일(’22.1.~’23.8./ 191억)

- 막여과 설치 착수 및 토목, 건축, 전기, 소방, 통신 공사 추진

❍ (급수 기반시설 확충) 취수원개발·배수지 확충(’22.1.~’23.3./ 95억)

- 지하수4공(4,000㎥/일), 배수지 2개소(2,700㎥), 송·배수관로(7.1㎞) 확충 등

❍ (원인자부담금 사업) 신축시설 등 수도시설 신‧증설(’22.1.~’23.1./ 40억)

- 배수지 1개소(1,000㎥), 상수관로(L=3.5㎞), 실시설계 용역 1식 등

❍ (물관련 법정계획 수립 마무리) ’22년 하반기 환경부 승인·고시

- 수도정비기본계획, 물수요관리종합계획, 상수원수질관리계획 등

❍ (물 절약을 위한 절수설비 보급) 절수형 대변기 70개·40백만원

❍ (인증정수장 특별관리) 대상 확대(1개소 → 9개소*) 및 인증심사(54백만원)

* 대상 : 조천, 애월, 구좌, 남원, 토평, 유수암, 금악, 서광, 회수

❍ (병원성 미생물검사 강화) 노로바이러스 연 1회, 바이러스 및 원생동물 연 4회

❍ (질산성질소 등 유해물질 수질분석장비 교체 및 보강) 3대·800백만원(’22.8월)

4		미래형 상수도 공급체계 구축으로 안전한 수돗물 공급

❍ 노후 수도시설 정비, 기능 개선으로 도내 17개 정수장 최적 운영체계 구축

❍ 수돗물‘취수 → 생산 → 공급’단계의 AI-ICT기반 스마트 관리체계 구축

□ 시설물 현황

(단위 : ㎥/일)

시설용량	정수장	지하수	담수장	저수지	용천수	배수지
533,902	343,500 (17개소)	190,402 (308공)	2개소	6개소	9개소	164개소

□ 추진상황

❍ (노후정수장 개량사업) 기본 및 실시설계용역 완료, 관급자재비 및 기성금 지출

- 월산정수장(Q=24천㎥/일), 별도봉정수장(Q=35천㎥/일)

❍ (농어촌생활용수 급수취약지 개선) 13개지구 L=18km, 완속여과지(1지) 정비

❍ (취‧정수장 노후설비개량) 노후 수배전반 공사 발주 및 소독설비 개량 준공

□ 추진계획

❍ 노후 취·정수장 시설개량

- 월산(Q=24천㎥/일)․별도봉(Q=35천㎥/일) 정수장 공사시행 : ’22.1.~12월, 64억

- 추자정수장 해수담수화시설(1,500㎥)증설 실시설계 : ’22.1.~12월, 20억

- 조천(Q=23천㎥/일)․토평(Q=19천㎥/일)정수장 고도정수처리시설 실시설계 : ’22.1.~12월, 43억

❍ 급수취약 개선 및 관로확충

- 읍면지역 등 급수취약개선 관로공사추진(L=13km) : ’22.1.~12월, 60억

- 삼양3수원~도련(정) 도수관로 시설공사추진(L=5km) : ’22.1.~12월, 33억

❍ 미래형 상수도 공급체계 구축 추진

- 정수장 체계 개편을 위한 상수도 종합컨트롤타워 구축추진 : ’22.1.~12월, 40억

* 산재된 17개 정수장을 ⇒ 5개 거점정수장 중심으로 통합관제

- AI·ICT기반 강정정수장 현대화사업 실시설계 : ’22.1.~12월, 13억

* 지자체 최초의 AI·ICT 기반 스마트 정수장, 상수도 전 과정 최첨단 수처리 적용

❍ 상수도 생산계통 기능 개선 및 시설개량

- 노후 펌프·소독·전기설비 등 6개소 교체 및 여과지 3개소 개량 : 90억

- 지하수 수중펌프 긴급인양 및 소독설비 등 개량 : 18억

- 안전한 시설관리를 위한 안전점검 및 지하수 사후관리 : 10억

5		유수율 블록구축 및 ICT를 활용한 유수율 제고사업 추진

❍ 노후 상수관망 정비, 블록 유지관리시스템 등 체계적·효율적 관망 관리체계를 구축함으로써 수돗물 신뢰도 제고 및 수도사업 선순환 구조 구축

□ 추진개요

❍ (사업기간) ’16 ~ ’27년 * 유수율 목표 : (’16년) 46% → (’27년) 85%

❍ (사업규모) 노후 상수관 정비 1,316㎞, 상수관망 블록구축 378블록

❍ (총사업비) 8,816억원(기투자 1,417, ’22년 424*, 향후 6,975)

- (’22년 사업비) 424억(유수율 300, 노후관 50, 급수취약 시설개선 59, 스마트인프라 15)

□ 추진계획

❍ (제주시, 서귀포시 동지역 유수율 제고사업) k-water 위탁시행, 275억

- 제주시 동지역(서부) 유수율 제고 현대화사업 : 175억

- 제주시 동지역(동부)·서귀포시 동지역 유수율 제고 : 100억

❍ (읍면지역 유수율 유지관리) 블록구축완료 지역 중점추진 25억

- 애월, 한림·한경, 대정·안덕, 남원·표선 대블록 누수탐사‧복구 등 유지관리(12억)

- 블록구축 및 완료지역 시설물 개선(10억), 상수관망 GIS DB 구축 등(3억)

❍ (블록구축지역 노후관 교체사업) ’16~’21년 186.5km, ’22년 15km·50억

❍ (기타 지원사업) 급수취약 상수도시설 및 행정시 급수관로 정비, 읍면 누수복구사업 59억

- 급수취약지역 상수도 시설 및 도·송수관 긴급복구 : 11억

- 행정시 배·급수관 관리 및 정비사업 등 : 42억

- 읍면 누수처 수리(10개읍면, 6억)

❍ (ICT 기술활용 스마트 관망관리 인프라 구축사업) 국비사업 마무리 및 자체사업 추진

- 유량 수압·누수감시 센서 설치(5억), 스마트 계량기 보급(10억) 등

* 계획 : 디지털수도미터 10,000전, 누수감지센서 533개, 자동드레인 8기 설치 등

6		안정적 하수처리를 위한 하수처리장 증설

❍ 도시발전 및 상주인구 유입 등 하수량 증가에 대비한 하수처리시설 증설

□ 추진개요 : 하수처리장(8개) 증설 130천톤(258천톤 → 388천톤)

(단위 : 천톤/일, 억원)

처리장	시설용량		총 사업비				사업기간	비 고
	현재	증설 후 (증설량)	계	기투자	’22년	향후
계	258	388(130)	5,274	648	242	4,384	’15.~’26.
제 주	130	220(90)	3,926	67	136	3,723	’21.~’26.	현대화 추진
동 부	12	24(12)	538	274	58	206	’17.~’24.	시공중 (공정률 2%)
서 부	24	44(20)	483	108	16	359	’21.~’24.	시공중 (공정률 18%)
남 원	8	16(8)	209	87	26	96	’20.~’23.	시공중 (공정률 54%)
색 달	23	(개량 6.5)	118	112	6	-	’20.~’22.	증설준공 (’22.2.28)
보 목	30		-	-	-	-	’18.~’20.	〃 (’20.7.31)
대 정	21		-	-	-	-	’19.~’21.	〃 (’21.7.26)
성 산	10		-	-	-	-	’15.~’17.	〃 (’17.12.20)

□ 추진상황

❍ (’15.~’22.) 소요예산 1,219억원 투입, 처리장 4개소 30.5천톤/일 증설 완료

- 색달(6.5천톤/ 118억), 보목(10천톤/ 674억), 대정(8천톤/ 270억) 성산(6천톤/ 157억)

❍ (’17.~’22.) 시공중 3개소(동부, 서부, 남원), 절차이행 중 1개소(제주)

※ (동부) ’17. 9월 발주하였으나, 주민반대로 현재까지 공사를 본격적으로 추진 못하는 상태

□ 추진계획

❍ (동부) 월정리 마을회와 지속적인 대화를 통해 마을상생방안 마련 등 주민협의를 병행하여 증설공사 추진

❍ (서부) 판포리와의 주민지원사업 협약체결과 병행하여 증설공사 추진

❍ (남원) ’23년 내 증설 마무리될 수 있도록 잔여사업비 전액 예산확보 추진

7		안정적 하수이송체계 구축을 위한 하수관로 정비

□ 안정적 하수이송 시스템 구축을 위한 차집관로 및 중계펌프장 개량 시급

□ 하수관로 정비 및 노후 차집관로 개량으로 안정적 하수이송

□ 추진개요

❍ 하수관로 : 5,505㎞   ❍ 차집관로 : 373㎞(압송 227㎞, 자연유하 146㎞)

◢ 하수관로 정비사업 추진

(단위 : km, 억원)

구 분	전체계획		'21년까지 실적		'22년		향후계획 (신설 및 계량)
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	5,505	32,569	4,434	19,761	41	648	1,030	12,160
재정	4,934	28,653	3,863	15,845	41	648	1,030	12,160
BTL	571	3,916	571	3,916	-	-	-	-

◢ 차집관로 정비 추진 : 373km(20년이상 노후관로 → 176km, 47.2%)

- 최근 5년간 차집관로 사고건수 : 35건(*최근 사고건수 증가 추세)

□ 추진상황

❍ (’21년 하수관로 신설 및 교체) 24개사업·56km·487억원

- 일도2동, 도두, 오라·아라, 성산, 보목·토평, 대정 관로사업 등

❍ (노후 하수관로 정밀조사 완료) 227㎞·13.3억(’20.6. ~ ’21.4월)

- (조사결과) 굴착 보수구간 6.6㎞, 비굴착 보수구간 2.9㎞, 맨홀보수 667개

□ 추진계획

❍ (’22년 하수관로 정비사업 추진) 26개사업·41km·648억

❍ (차집관로 정비를 위한 설계 및 정비사업 착수) 3건·92.1km·40억

- 차집관로 정비(3건) : 제주시 동지역(제주), 서부처리구역, 서귀포시 동지역(보목, 색달)

8		청정제주 실현을 위한 제주공공하수처리시설 현대화사업 추진

❍ 제주하수처리장의 하수량 증가와 시설 노후화에 따른 수질기준 초과 및 악취문제 해결로 청정제주 보존 및 주민의 삶의 질 개선

□ 사업개요

❍ (사업기간) ’19 ~ ’26년

❍ (총사업비) 3,927억원(국비 1,840, 지방비 2,087)

❍ (시설용량) 현대화 22만㎥/일(기존 13만, 증설 9만)

❍ (주요시설) 하수처리시설(22만㎥), 분뇨전처리시설(400㎥), 하수찌꺼기 처리시설(150톤), 해양방류관로(L=1.5km), 생태공원 조성 등

* 무중단 공법 도입, 처리시설의 완전지하화로 악취 원천 차단 및 상부 공원화

□ 추진상황

❍ (’18. 6. 8.) 제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획(변경) 승인(환경부)

❍ (’19. 1. 29.) 국가균형발전 프로젝트사업 선정(예타 면제) 후 사업계획 적정성 검토(KDI) 및 총사업비 조정 승인(’21. 7월) 등 추진 기반 마련

❍ (’22. 2. 25.) 신규 입찰공고(설계․시공 일괄 입찰방식)

❍ (’22. 3. 31.) 기본설계 착수(2개 컨소시엄 참여)

□ 추진계획

❍ (설계시행) 기본설계 완료(’22. 8. 28.), 실시설계 90일(’22. 11.~’23. 1.)

* 기본설계 심의 및 실시설계적격자 선정(’22. 10.), 실시설계 심의 및 설계VE(’23. 3.)

❍ (인‧허가) 인․허가의 사전 검토 및 선제적 대응으로 차질 없는 이행 추진

❍ (공사시행) 착공일로부터 57개월(’23. 4.~’27. 12.)

❍ (주민소통 및 상생방안 마련) 주민대표협의체 및 현대화사업추진위원회 운영

❍ (준공전 까지 안정적 하수처리장 운영) 각종 처리시설에 대한 선제적 시설 유지․관리로 현대화 완료 전 까지 안정적 운영 여건 확보 노력 지속