2022년도 공유재산관리계획변경안

〔인화초등학교 급식실 증개축〕

의안 번호	86		제출일자 : 2022. 7. . 제 출 자 : 제주특별자치도교육감

1. 제안이유

❍ 2021년 10월 공유재산관리계획변경 심의 의결을 받았으나 그 이후 발표한 중기학생배치계획에서는 학생수가 급감하여 부득이하게 사업물량을 조정하고,

❍ 노후된 급식실 건물 및 상층부의 샌드위치패널 건물을 철거하여 급식실을 증개축하고, HACCP규정에 맞는 위생적인 급식 환경을 제공하여 쾌적하고 안전한 교육공간 조성을 위하여,

❍「공유재산 및 물품 관리법」제10조 및 같은 법 시행령 제7조,「제주특별자치도교육감 소관 공유재산관리 조례」제13조제1항의 규정에 따라 공유재산관리계획변경(안)에 대한 의결을 얻기 위함

※ 2020년 중기학생 배치 계획

학교명	구분	중기학생배치계획						비고
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
인화초	학급수	44	43	40	39	37	35
	학생수	1,235	1,193	1,110	1,062	964	887

※ 2021년 중기학생 배치 계획

학교명	구분	중기학생배치계획						비고
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
인화초	학급수	42	39	37	33	31	28
	학생수	1,187	1,089	1,016	891	787	698

2. 사업개요

❍ 소 재 지: 제주시 신산로 15길 35

❍ 건축연면적: 920.0㎡

❍ 사업기간: 2019년 1월 ~ 2025년 6월

❍ 사 업 비: 4,856,750천원

❍ 주요시설: 급식시설현대화(조리실 및 식당),화장실 2실 등

❍ 변경사항

구분	당초	변경	증감
건축연면적	2,455.23㎡	920㎡	(감)1,535.23㎡
사업기간	2019. 1. ~ 2024. 8.	2019. 1. ~ 2025. 6.	(증)10개월
사 업 비	9,244,870천원	4,856,750천원	(감)4,388,120천원
규 모	지하1층 기계실 지상1층 조리실, 식당 지상2층 특별교실 지상3층 교실 6실	지하1층 기계실 지상1층 조리실, 식당 - -

※사업기간 연장 사유: 사업 계획 변경에 따른 재설계 기간 증가

3. 공유재산관리계획서: 붙임과 같음

4. 참고자료

❍ 사업계획서: 붙임과 같음

❍ 위치도 및 사진: 붙임과 같음

공 유 재 산 관 리 계 획 서

제주특별자치도교육청

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

재산 구분	취 득								처 분								비고
	계		매 입		교 환		기 타		계		매 각		교 환		양 여
	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액
1.토 지
2.건 물	920	4,856,750					920	4,856,750
3.공작물
4.입목죽
5.기계기구
6.기 타
총계	920	4,856,750					920	4,856,750

취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재산의 구 분	재 산 의 표 시			추정가액	취득시기	취득사유	취득대상재산 소유자 주소, 성명	비고
		소 재 지	지목 및 구조	면적
1	건물	제주시 신산로 15길 35	철근콘크리트	920	4,856,750	2025년 상반기	급식실 증개축	제주특별자치도교육감

(인화초등학교 급식실 증축 사업)

노후된 급식실 건물 및 상층부의 샌드위치패널 건물을 철거하여 급식실을 증개축하고, HACCP규정에 맞는 위생적인 급식 환경을 제공하여 쾌적하고 안전한 교육공간 조성

사업개요

❍ 소 재 지: 제주시 신산로 15길 35

❍ 건축연면적: 920㎡

❍ 사업기간: 2019년 1월 ~ 2025년 6월

❍ 사 업 비: 4,856,750천원

❍ 주요시설: 급식시설현대화(조리실 및 식당),화장실 1실 등

❍ 사업주관: 제주시교육지원청

사업예산 확보계획

(단위 : 천원)

구분	계		기편성		2022년		2023년이후		비고
	계	자체	계	자체	계	자체	계	자체
건물	4,856,750	4,856,750	240,000	240,000	204,500	204,500	4,412,250	4,412,250
계	4,856,750	4,856,750	240,000	240,000	204,500	204,500	4,412,250	4,412,250

※ 기존 설계용역 2019년 10월 완료(240,000천원), 시설비 계속비 편성 예정

기대효과

❍ 급식실 증개축을 통해 노후 급식시설개선으로 위생, 안전성 확보 및 HACCP제도를 정착하고, 쾌적하고 현대화된 급식환경 조성으로 급식의 질 향상

위치도

급식실 위치

현장사진