2022년도 공유재산관리계획변경안

〔하례초등학교 다목적체육관 및 급식실, 유치원 증축〕

의안 번호	87		제출일자 : 2022. 7. . 제 출 자 : 제주특별자치도교육감

1. 제안이유

❍ 2018년 11월 공유재산관리계획 의결을 받은 사업으로, 학생들의 효율적인 체육활동과 건강증진을 도모하고 지역주민의 생활체육 및 지역문화 증진센터로 공간을 제공하고자 하며, 노후된 급식시설을 개선하여 쾌적한 급식환경을 조성하고자,

❍ 「공유재산 및 물품 관리법」제10조 및 같은 법 시행령 제7조, 「제주특별자치도교육감 소관 공유재산관리 조례」제13조제1항의 규정에 따라 공유재산관리계획변경(안)에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

❍ 소 재 지 : 서귀포시 남원읍 일주동로 8002

❍ 건축연면적 : 1,560㎡

❍ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2024년 12월

❍ 사 업 비 : 6,927,250천원

❍ 주요시설 : 다목적체육관(급식실,유치원 포함),승강기시설 1식,    신재생에너지 1식 등

❍ 변경사항

구분	당초	변경	증감
건축연면적	1,560㎡	1,560㎡	변경없음
사업기간	2019.1.~2020.7.	2019.1.~2024.12.	(증)4년 5개월
사업비	4,716,000천원	6,927,250원	(증)2,211,250천원

3. 공유재산관리계획서 : 붙임과 같음

4. 참고자료

❍ 사업계획서 : 붙임과 같음

❍ 위치도 및 사진 : 붙임과 같음

공 유 재 산 관 리 계 획 서

제주특별자치도교육청

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

재산 구분	취 득								처 분								비고
	계		매 입		교 환		기 타		계		매 각		교 환		양 여
	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액
1.토 지
2.건 물	1,560	6,927,250					1,560	6,927,250
3.공작물
4.입목죽
5.기계기구
6.기 타
총계	1,560	6,927,250					1,560	6,927,250

취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재산의 구 분	재 산 의 표 시			추정가액	취득시기	취득사유	취득대상재산 소유자 주소, 성명	비고
		소 재 지	지목 및 구조	면적
1	건물	서귀포시 남원읍 일주동로 8002	철근 콘크리트조	1,560	6,927,250	2024 하반기	급식실,유치원 및 다목적체육관 증축	제주특별자치도교육감

(하례초등학교 다목적체육관 및 급식실, 유치원 증축 사업)

학생들의 효율적인 체육활동과 건강증진을 도모하고 지역주민의 생활체육 및 지역문화 증진센터로 공간을 제공하고 노후된 급식시설을 개선하여 쾌적한 급식환경 조성

사업개요

❍ 건축연면적 : 1,560㎡

❍ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2024년 12월

❍ 사 업 비 : 6,927,250천원

❍ 주요시설 : 다목적체육관(급식실,유치원 포함),승강기시설 1식, 신재생에너지 1식 등

❍ 사업주관 : 서귀포시교육지원청

사업예산 확보계획

(단위 : 천원)

구분	계		기편성		2022년		2023년이후		비고
	계	자체	계	자체	계	자체	계	자체
건물	6,927,250	6,927,250	166,000	166,000	250,000	250,000	6,511,250	6,511,250
계	6,927,250	6,927,250	166,000	166,000	250,000	250,000	6,511,250	6,511,250

※ 기존 설계용역 2019년 9월 완료(166,000천원), 시설비 계속비 편성 예정

기대효과

❍ 다목적체육관 조성으로 외부 기상 여건과 관계없이 다양한 체육활동 및 교수학습 활동이 가능하여 교육 수요자의 만족도를 높임

❍ 노후화된 급식실을 쾌적하고 현대화된 급식환경 조성

❍ 유치원시설 현대화를 통해 교육환경 여건 개선으로 유아 및 학부모 만족도 제고

위치도

급식실 및 다목적체육관

현장사진