2022년도 공유재산관리계획변경안

〔(가칭)유아체험교육원 설립〕

의안 번호	485		제출일자 : 2022. 12. . 제 출 자 : 제주특별자치도교육감

1. 제안이유

❍ 폐교(구 삼양초 회천분교장)를 활용하여 도내 만3~5세 유아들이 자연 속에서 뛰놀 수 있고 제주의 신화･역사･자연 친화적인 체험이 가능한 교육환경으로 조성하기 위해 (가칭)유아체험교육원을 설립하는 사업으로,

❍ 제382회 제주특별자치도의회 임시회에서 원안가결 되어 공공건축사업계획 사전검토, 공공건축심의위원회, 설계공모를 통한 설계용역, 설계의 경제성 검토 용역, 감사위원회 일상감사, 지방심의위원회 심의를 실시하는 과정에서 설계 협의 및 심의사항 보완하는 기간이 소요되고 원자재 상승으로 인한 시설단가 변경사항 및 실내･외 리모델링 등을 반영하며 사업비가 증가함에 따라,

❍「공유재산 및 물품 관리법」제10조2 및 같은 법 시행령 제7조, 「제주특별자치도교육감 소관 공유재산관리 조례」제13조, 제1항의 규정에 따라 공유재산관리계획변경안에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

❍ 소 재 지 : 제주시 중산간동로 203(회천동)

❍ 건축연면적 : 2,994㎡

❍ 사업기간 : 2020년 5월 ~ 2024년 4월(2024년 7월 개원 예정)

❍ 사 업 비 : 17,602,366천원

❍ 주요시설 : 지하 1층 ~ 지상 2층, 실외 놀이시설 등

❍ 변경사항

구분	당초	변경	증감
건축연면적	3,669㎡	2,994㎡	(감)666㎡
사업기간	2020. 5. ~ 2022. 3.	2020. 5. ~ 2024. 4.	(증)2년 1개월
건축사업비	10,576,900천원	17,602,366천원	(증)7,025,466천원
토지취득비	1,179,000천원
계	11,755,900천원	17,602,366천원

3. 공유재산관리계획서: 붙임과 같음

4. 참고자료

❍ 사업계획서: 붙임과 같음

❍ 위치도 및 사진: 붙임과 같음

공 유 재 산 관 리 계 획 서

제주특별자치도교육청

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

재산 구분	취 득								처 분								비고
	계		매 입		교 환		기 타		계		매 각		교 환		양 여
	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액
1.토 지
2.건 물	2,994	17,602,366					2,994	17,602,366
3.공작물
4.입목죽
5.기계기구
6.기 타
총계	2,994	17,602,366					2,994	17,602,366

취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재산의 구 분	재 산 의 표 시			추정가액	취득시기	취득사유	취득대상재산 소유자 주소, 성명	비고
		소 재 지	지목 및 구조	면적
1	건물	제주시 중산간동로 203(회천동)	철근콘크리트	2,994	17,602,366	2024년 상반기	(가칭)유아체험교육원 설립	제주특별자치도교육감

( (가칭)유아체험교육원 설립 )

구)회천분교장 폐교부지를 활용하여 제주자연 속 놀이정원으로 (가칭)유아체험교육원을 설립하여 도내 만3~5세 유아들이 자연속에서 뛰놀며 배움으로 성장할 수 있는 교육 환경 기반 조성

사업개요

❍ 소 재 지 : 제주시 중산간동로 203(회천동)

❍ 건축연면적 : 2,994㎡

❍ 사업기간 : 2020년 5월 ~ 2024년 4월(2024년 7월 개원 예정)

❍ 사 업 비 : 17,602,366천원

❍ 주요시설 : 지하 1층 ~ 지상 2층, 실외 놀이시설 등

❍ 사업주관 : 제주특별자치도교육청

사업예산 확보계획

(단위 : 천원)

구분	계		2022년 이전		2022년		2023년 이후		비고
	계	자체	계	자체	계	자체	계	자체
건물	17,602,366	17,602,366	578,056	578,056	2,684,000	2,684,000	14,340,310	14,340,310
계	17,602,366	17,602,366	578,056	578,056	2,684,000	2,684,000	14,340,310	14,340,310

※ 기타 :시설비 계속비 반영 예정

기대효과

❍ 제주의 신화･역사･자연 친화적인 체험시설 환경 조성으로 유아 창의･인성교육 실현

❍ 지역별 균형 발전을 위한 유아교육 환경 마련으로 공교육 체제 확립

❍ 미세 먼지 등 기상 변화에 대처하는 유아 전용 실내외 체험시설 조성으로 교육의 효과 증대 및 질 높은 교육 서비스 제공

설계도

현장사진

조감도