2022년도 공유재산관리계획변경안

〔제주학생문화원 주차타워 증축〕

의안 번호	486		제출일자 : 2022. 12. . 제 출 자 : 제주특별자치도교육감

1. 제안이유

❍ 제주학생문화원은 도내 학생 뿐만 아니라 제주도민 모두가 사용하는 중요 공연·문화시설로 이용 인구가 꾸준히 증가하고 있으나 주차시설이 부족하여 교통 혼란 및 민원이 발생하고 있어 주차타워를 설치하여 주차난을 해결하고 공간의 이용 접근성을 높이고자 2022년도 공유재산관리계획안을 제출하였으나,

❍ 제400회 제주특별자치도의회 제2차 정례회에서 미관을 고려하고 안전한 통행을 위해 현재 계획된 위치를 다른 위치로 변경하여 추진하는 것을 부대의견으로 원안가결 됨에 따라,

❍ 위치를 학생문화원 뒤편으로 변경하고 사전기획 결과를 반영하여 학생문화원 부지의 효율적인 공간활용을 도모하고 주차대수를 늘려 지역 주민들 및 이용자들에게 쾌적한 주차공간을 제공하고자,

❍「공유재산 및 물품관리법」제10조2 및 같은 법 시행령 제7조, 「제주특별자치도교육감 소관 공유재산관리 조례」제13조, 제1항의 규정에 따라 공유재산관리계획변경(안)에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

❍ 소 재 지 : 제주시 연삼로 489

❍ 건축연면적 : 3,192㎡

❍ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2026년 1월

❍ 사 업 비 : 10,880,710천원

❍ 주요시설 : 지하 1층 ~ 지상 1층 및 옥상(주차대수 약 143대)

❍ 변경사항

구분	당초	변경	증감
건축연면적	2,800㎡	3,192㎡	(증)392㎡
사업기간	2022. 1. ~ 2025. 4.	2022. 1. ~ 2026. 1.	(증)9개월
사업비	3,548,000천원	10,880,710천원	(증)7,332,710천원

3. 공유재산관리계획서: 붙임과 같음

4. 참고자료

❍ 사업계획서: 붙임과 같음

❍ 위치도 및 사진: 붙임과 같음

공 유 재 산 관 리 계 획 서

제주특별자치도교육청

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

재산 구분	취 득								처 분								비고
	계		매 입		교 환		기 타		계		매 각		교 환		양 여
	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액
1.토 지
2.건 물	3,192	10,880,710					3,192	10,880,710
3.공작물
4.입목죽
5.기계기구
6.기 타
총계	3,192	10,880,710					3,192	10,880,710

취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재산의 구 분	재 산 의 표 시			추정가액	취득시기	취득사유	취득대상재산 소유자 주소, 성명	비고
		소 재 지	지목 및 구조	면적
1	건물	제주시 연삼로 489	철근콘크리트	3,192	10,880,710	2026년 상반기	주차타워 증축	제주특별자치도교육감

(제주학생문화원 주차타워 증축)

제주학생문화원은 도내 학생 뿐만 아니라 제주도민 모두가 사용하는 중요 공연·문화시설로 이용 인구가 꾸준히 증가하고 있으나 주차시설이 부족하여 교통 혼란 및 민원이 발생하고 있어 주차타워를 설치하여 주차난을 해결하고 공간의 이용 접근성을 높이고자 함

사업개요

❍ 소 재 지 : 제주시 연삼로 489

❍ 건축연면적 : 3,192㎡

❍ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2026년 1월

❍ 사 업 비 : 10,880,710천원

❍ 주요시설 : 지하 1층 ~ 지상 1층 및 옥상(주차대수 약 143대)

❍ 사업주관 : 제주특별자치도교육청

사업예산 확보계획

(단위 : 천원)

구분	계		2022년		2023년		2024년 이후		비고
	계	자체	계	자체	계	자체	계	자체
건물	10,880,710	10,880,710	1,000,000	1,000,000	610,000	610,000	9,270,710	9,270,710
계	10,880,710	10,880,710	1,000,000	1,000,000	610,000	610,000	9,270,710	9,270,710

※ 기타 :시설비 계속비 반영 예정

기대효과

❍ 차량을 이용한 시설 접근성을 높여 공공시설 사용의 편의를 증진시키고 지역 주민들에게 안전하고 쾌적한 주차공간 제공

❍ 위치를 변경함으로써 학생문화원 전경이 훼손되지 않고, 추후 학생들을 위한 공간으로 재구성 시 효율적 공간 활용 가능

위치도

현장사진