제420회 제주특별자치도의회 임시회

문화관광체육위원회

「공공체육시설 테니스장 조성사업」 추진을 위한 업무협약 보고

2023. 9.

(체 육 진 흥 과)

「공공체육시설 테니스장 조성사업」추진을 위한

제주특별자치도-제주경찰청 업무협약건 보고

◇ 본 사업은 도내 급증하는 테니스 동호인과 관련하여 도심지내 공공테니스장 수요에 대응하고자 추진하는 사업으로

◇ 제주경찰청 유휴부지를 활용하여 개방형 생활체육시설인 테니스장(2면)을 조성하고자 성공적인 추진을 위하여 업무협약 체결한 건임

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 제주시 노형동 560번지외 3필지(3,703㎡)

❍ 사 업 비 : 691,614천원 (용역비 64,972 / 공사비 607,677 / 기타 19,010)

❍ 사업규모 : 테니스장(2면) 조성 및 주차장(9면), 휴게시설 등

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. (공사기간 2023. 6. ~ 12.)

Ⅱ		협약개요

❍ 일시 및 방법 : 2023. 7. 24., 서면 체결

❍ 협약대상 : 제주특별자치도 ↔ 제주특별자치도경찰청

❍ 협약기간 : 상호 협의시 종료

Ⅲ		협약 주요내용

❍ 양 기관의 업무분담

- (제주자치도) 사업비 부담, 공사 발주□감독, 인허가 업무 등

- (제주경찰청) 사업부지 무상제공 및 인허가 업무 지원 등

❍ 협조 및 의무

- 테니스장 시설물의 의무 존치기간은 10년으로 하며, 양 기관의 상호 협의하에 사용 기간을 연장함.

- 시설 자산의 내구연한이 증가하는 개보수는 제주자치도가 직접 시행

❍ 테니스장 운영계획 수립

- 사후 운영관리주체*, 운영방법, 지역주민 적극개방 등 양 기관 협의하에 테니스장 운영관리를 위한 사업계획 수립□결정(10월~11월)

* 조성사업완료 후, 제주경찰청에서 관리운영하는 것으로 협의 중

❍ 양 기관은 특별한 경우를 제외하고는 제주도민들이 자유롭게 테니스장을 항시 이용할 수 있도록 함.

Ⅳ		추진 경과 및 향후계획

❍ 2022. 07. ~ 12. : 사업추진 관련 제주경찰청(경무기획과) 업무협의 3차례

❍ 2023. 05. : 실시설계용역 완료

❍ 2023. 05. : 공사계약심사 및 일상감사의뢰 완료

❍ 2023. 06. : 조성공사 착공 (장마 및 태풍영향권으로 공사일시 중지*)

*공사일시 중지기간 : 2023. 06. 19. ~ 2023. 08. 06.

❍ 2023. 07. : 「공공체육시설 테니스장 조성사업」추진을 위한 업무협약 체결

❍ 2023. 10. ~ 11. : 개방형 생활체육시설(테니스장) 운영계획 수립

❍ 2023. 12. : 조성공사 준공(예정) 및 시운전