제421회 제주특별자치도의회 임시회

미래환경특별위원회 제4차 회의

2023. 10. 10.(화), 15:00

	제421회 제주특별자치도의회 임시회 미래환경특별위원회 제4차 회의 - 신재생에너지 다변화를 위한 수열에너지 활용방안 -

	제주특별자치도의회 (미래환경특별위원회)

제421회 임시회 미래환경특별위원회 제4차 회의

신재생에너지 다변화를 위한 수열에너지 활용방안

□ 추진배경

지하수·용천수 등 미활용 수자원을 이용한 수열에너지 활용 방안을 마련하고자 제주도내 학교를 대상으로 수열에너지 시범사업 추진을 위한 기관 및 관계부서 간 협의 및 논의

□ 시범사업 개요

❍ 대  상: 화북초등학교 (제주시 일주동로 157)

❍ 수열원: 건축물(학교)로부터 약 100m 거리의 삼양수원지 원수관로에서 별도봉정수장 취수 원수(25,000㎥/일) 활용

❍ 설비규모(안)

- 기존 냉난방 설비(공기열 히트펌프) 내용연수(9년) 미도래로 기설비 유지 후 수열 설비 신규 설치

＊ (신설) 열교환기, 히트펌프, 실내기, 냉매배관, 펌프류(원수, 브라인펌프)

- (원수관로) 기존 원수관로 600㎜에서 본관 및 별관 수열공급 계획을 고려하여 200㎜ 관로 우선 구축

- (열교환기) 강당 및 급식소 수열공급 계획을 고려, 40RT 용량으로 구축

- (히트펌프) 강당만 고려 25RT 히트펌프 설치

＊ 향후 급식소 수열에너지 사업시 히트펌프(15RT)만 추가 설치

＊ 향후 본관 및 별관동 개축 시 열교환기, 히트펌프(85RT) 추가 설치

□ 그간의 추진경과

❍ 2023. 8. 14. 수열에너지 활용 관련 학교 수열에너지 시범사업 제안

＊ 미래환경특별위원회 강경문 위원장

❍ 2023. 9. 4. 학교 수열에너지 시범사업 적정성 및 기술적 검토 요청

＊ 한국수자원공사에 검토지원 의뢰

❍ 2023. 9. 7. K-water 제주지역협력본부 수열에너지 관련 현장조사 실시

❍ 2023. 9. 8. K-water 제주지역협력본부, 제주특별자치도 상하수도본부

수열에너지 관련협의

□ 관계부서 의견

❍ 상하수도본부

- 식수원의 오염 가능성 및 삼양정수장(급수인 5만명)의 물 공급 등 차질 발생에 따른 대처방안

❍ 교육청

- 원수관로에 연결시 유지관리 등 수열에너지 관련 전문적인 지식부족으로 유지관리에 따른 지속적인 위탁용역 관리비 필요

- 에너지절감 및 온실가스 감축효과가 있지만 투자회수기간이 길어 경제성 부족

❍ 기타 의견

- 현재 용천수는 신재생에너지법상 수열에너지원 범위에 포함되지 않아 국가 공모 등을 통한 국비 확보의 어려움이 있음.

□ 기관 및 관계부서 역할

❍ (도교육청) 예산(국·도비)확보 등 시범사업 추진(화북초)

❍ (상하수도본부) 행정적 지원(원수관로 이용 등 시설 설치를 위한 협조·지원)

❍ (K-water 제주지역협력본부) 수열에너지 설비 설치 및 운용에 필요한 기술지원(자문)

❍ (도의회) 예산심의 및 제도적 지원 방안 마련, 타당성 용역 추진(필요시) 등

□ 향후계획

❍ 사업비 예산확보 및 인허가 등 관계부서 협의

❍ 용천수 활용 시범사업(우수성 검증)을 통해 수열원 범위 확대 등 제도개선 추진

❍ 환경부 수열에너지 보급·지원 시범사업 공모 신청(25년도 이후)

【붙임】

보조자료 1. 수열에너지 개념 및 활용사례

보조자료 2. 수열에너지 활용과 도입방안(K-water)