제주특별자치도교육청

2024년도 수시분 공유재산관리계획안

의안 번호	1513		제출일자 : 2024년 5월 일 제 출 자 : 제주특별자치도교육감

1. 제안이유

❍ 「공유재산 및 물품 관리법」제10조의 2 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 2024년도 수시분 공유재산 관리계획을 수립하고, 공유재산심의회의 자문을 거쳐 제주특별자치도의회 의결을 얻어 시행하고자 함

2. 주요내용

가. 취득(증축):1건

❍ 취득(증축)목적

학교명	목 적
도평 초등학교	현재 다목적체육관이 없어 체육 교육활동을 위한 충분한 활동공간 조성이 필요하며 협소한 급식공간의 확충으로 쾌적하고 안전한 급식환경 제공

붙임: 제주특별자치도교육청 2024년도 수시분 공유재산관리계획안

제주특별자치도교육청 2024년도 수시분 공유재산관리계획안

2024년도 수시분 공유재산관리계획 총괄표

(단위: ㎡, 천원)

재산구분	취 득								처 분								비고
	계		매입		교환에 의한 취득		기타(증축)		계		매각		교환에 의한 처분		기타(철거)
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
건물(㎡)	3,216	11,334,570	.	.	.	.	3,216	11,334,570	.	.	.	.	.	.	.	.

2024년도 수시분 공유재산관리계획 취득대상 재산목록

(단위: ㎡, 천원)

재산의 구분	재 산 표 시			추 정 가 액			취득 시기	취득 사유	비고
	지목	소 재 지	수량 (증축면적)	교부금	자체	계
건물	학교용지	제주시 도평길 17	3,216	0	11,334,570	11,334,570	2027년 상반기	도평초등학교 다목적체육관 및 급식실 증축

제주특별자치도교육청

2024년도 수시분 공유재산 관리계획안

사업설명서

도평초등학교 다목적체육관 및 급식실 증축

사업목적 및 용도

❍ 현재 실내 체육활동을 위한 충분한 공간이 없는 상황으로 다목적체육관을 증축하여 기상상황의 영향을 받지않고 체육교육활동을 차질없이 운영할 수 있는 환경을 마련하고자 함

❍ 급식공간 확충을 통해 쾌적한 급식환경 제공 및 안전한 조리공간을 조성하고자 함

연도별 중기학생배치계획

(단위:명,학급)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	증 감
학생수	389	370	340	316	283	260	△129
학급수	16	16	15	15	14	14	△2
급당학생수	24.3	23.1	22.7	21.1	20.2	18.6	△5.7

사업개요

❍ 소 재 지: 제주시 도평길 17

❍ 건축 연면적: 증축 3,216㎡(1동 지하 1층, 지상 2층)

❍ 사업기간: 2023년  6월 ~  2027년  3월

❍ 사 업 비: 11,334,570천원

❍ 주요시설: 지하 1층(주차장, 기계실 등)
지상 1층(조리실, 식당 등)
지상 2층(다목적체육관, 연결통로 등)

❍ 사업주관: 제주특별자치도교육청 체육건강과

추진경과 및 향후 계획

추진경과 및 향후계획	내 용	비 고
2023. 6. ~ 2024. 2.	사전기획 용역 및 적정성 검토
2024. 6.	공공건축 심의
2024. 7. ~ 9.	설계(일반)공모 및 계약
2024. 10. ~ 2025. 5.	계획 및 실시설계
2025. 6.	유관기관 협의 및 일상감사 의뢰
2025. 7.	검토 및 발주
2025. 8. ~ 9.	조달계약
2025. 10. ~ 2027. 3.	시설 공사

소요예산

(단위: 천원)

구분	계		2024년 이전		2024년		2024년 이후		비고
	계	자체	계	자체	계	자체	계	자체
건물	11,334,570	11,334,570	40,000	40,000	200,300	200,300	11,094,270	11,094,270
계	11,334,570	11,334,570	40,000	40,000	200,300	200,300	11,094,270	11,094,270

기대효과

❍ 체육활동에 기후 상황의 제약이 없는 공간 조성으로 학생들의 건강 증진 도모 및 쾌적한 체육교육활동 마련

❍ 충분한 급식공간 확충으로 쾌적하고 청결한 급식환경을 조성하고 배식 및 조리 동선 확대로 안전사고 예방 기대

참고1		위치도 및 현황사진

위치도

현황사진

참고2		사업비 산출서

구 분	항 목	산출기초
		단 가		수 량		금 액
공사비	기계실 및 주차장	2,210천원	×	845㎡	=	1,867,450
	홀 및 계단실, 연결통로	2,210천원	×	450㎡	=	994,500
	조리실	4,520천원	×	196㎡	=	885,920
	식당	2,210천원	×	280㎡	=	618,800
	필로티	552.5천원	×	360㎡	=	198,900
	강당 및 무대	3,320천원	×	880㎡	=	2,921,600
	화장실 및 샤워실	3,320천원	×	160㎡	=	531,200
	클라이밍실 및 기구보관실	3,320천원	×	45㎡	=	149,400
	엘리베이터 및 클라이밍 시설	156,000천원	×	1식	=	156,000
	설비시설 (전기, 방송, 소방 등)	1,260,000천원	×	1식	=	1,260,000
	부대정비 (암파쇄, 이전 등)	400,000천원	×	1식	=	400,000
소 계						9,983,770
용역비	사전기획비	40,000천원	×	1식	=	40,000
	설계비	479,000천원	×	1식	=	479,000
	설계공모비	47,900천원	×	1식	=	47,900
	설계의도구현비	47,900천원	×	1식	=	47,900
	감리비	620,000천원	×	1식	=	620,000
소 계						1,234,800
기 타	시설부대비 (인증비용 등)	116,000천원	×	1식	=	116,000
소 계						116,000
합 계						11,334,570

(단위: 천원)