	제427회 제주특별자치도의회 임시회 교육위원회 제1차 회의 2024. 5. 17.(금) 10:00

제주특별자치도교육청

2024년도 수시분 공유재산관리계획안

[도평초등학교 다목적체육관 및 급식실 증축]

검  토  보  고  서

교육위원회 전문위원

제주특별자치도교육청

2024년도 수시분 공유재산관리계획안 총괄

□ 안건 현황

(단위: 천원)

안건 번호	안건명	최초 의결일	총사업비	쪽
1513	도평초등학교 다목적체육관 및 급식실 증축 사업	신규	11,334,570	1
사업비 합계			11,334,570

제주특별자치도교육청 2024년도 수시분 공유재산관리계획안

[도평초등학교 다목적체육관 및 급식실 증축 사업]

검  토  보  고  서

의안 번호	1513		제출연월일: 2024. 5. 3.
			제 출 자: 제주특별자치도교육감
			회부연월일: 2024. 5. 7.

1. 제안이유

□ 도평초등학교는 현재 다목적체육관이 없어 체육 교육활동을 위한 충분한 공간이 없는 상황으로 기상상황의 영향을 받지않고 체육교육활동을 차질없이 운영할 수 있는 환경을 마련하고자 함

□ 협소한 급식공간 확충을 통해 쾌적한 급식환경 제공 및 안전한 조리공간을 조성하고자 함

2. 주요내용

□ 소재지: 제주특별자치도 제주시 도평길 17

□ 부지면적: 10,043㎡

□ 건축연면적: 증축 3,216㎡(1동 지하 1층, 지상 2층)

□ 사업기간: 2023년 06월 ~ 2027년 03월

□ 사업비: 11,334,570천원

□ 주요시설: 지하 1층(주차장, 기계실 등), 지상 1층(조리실, 식당 등)  지상 2층(다목적체육관, 연결통로 등)

□ 공유재산관리계획

(단위:㎡, 천원)

재산 구분	취 득								비고
	계		매 입		교 환		기 타(증 축)
	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액
건물	3,216	11,334,570					3,216	11,334,570
계	3,216	11,334,570					3,216	11,334,570

□ 사업예산 확보계획

(단위: 천원)

구분	계			2024년 이전			2024년			2024년 이후			비고
	계	국고	자체	계	국고	자체	계	국고	자체	계	국고	자체
건물	11,334,570		11,334,570	40,000		40,000	200,300		200,300	11,094,270		11,094,270
계	11,334,570		11,334,570	40,000		40,000	200,300		200,300	11,094,270		11,094,270

3. 검토 의견

□ 도평초등학교 다목적체육관 및 급식실 증축사업은 학생들의 효율적인 체육활동과 건강증진을 도모하고 노후된 급식실을 개선하는 사업임

□ 도평초등학교는 2024년 3월 기준 16학급, 368명이 재학하고 있으나 다목적체육관이 없어 우천 시 정상적인 체육 교육활동이 어렵고, 기존 급식실은 협소하고 노후화가 진행되고 있음

기존 급식실 증축연도 2008년, 면적 252.8㎡(도교육청 제공 자료)

□ 이에, 다목적체육관을 증축하여 쾌적하고 안전한 교육 환경을 조성하고자 건물 내 지상 1층에 급식실을 위치시키고 기존 급식실(252.8㎡)보다 대폭넓어진 476㎡의 면적으로 계획 하고 있음

□ 다만, 2024~2028년 중기제주교육 재정계획에 따르면 총 예정사업비 10,097백만원 중 자체재원은 480백만원(4.8%)에 불과하고, 95.2%인 9,617백만원을 지방채로 충당하는 것으로 계획하고 있어 향후 예산 확보 방안에 대한 구체적인 설명이 필요하다고 사료됨

2024~2028년 중기제주교육 재정계획                                                           (단위: 백만원)

구분	총사업비	2024	2025	2026	2027	비율
계	10,097	480	4,294	5,323	0
자체재원	480	480	0	0	0	4.8%
지방채	9,617	0	4,294	5,323	0	95.2%

□ 또한, 다목적체육관 건립 예정 부지는 기존 실외 체육장 부지를 일부 활용할 계획으로 현재 실외 체육장이 종전에 비해 3분의 2 수준으로 줄어들게되어 실외 체육 교육활동에 제약이 우려되므로 이에 대한 대책 마련이 필요해 보임

‘다목적체육관 없는 도평초, 운동장 3분의 1 날리고 짓는다!’(제주의 소리 기사, 2024. 5. 9.)

다목적체육관 및 급식실 증축 사업에 따른 면적 변동 비교표

구분	기존			변경			증감
	강당	급식실	실외 체육장	강당	급식실	실외 체육장	강당	급식실	실외 체육장
면적 (단위:㎡)	-	252.8	3,307	880	476	2,067	880	223.2	△1,240

□ 아울러, 기존 급식실 공간에 대한 별도의 활용 방안 마련이 필요하며, 2023~2028년 중기학생배치계획에 따르면, 2023년 기준 학생수 389명(16학급)에서 2028년에는 260명(14학급)으로 학생수가 129명으로 감소가 예상되어 다목적체육관의 활용도를 높이기 위하여 다목적체육관을 지역주민이 함께 이용할수 있도록 학교관계자 및 지역주민의 의견을 충분히 수렴하는 과정이 필요하다고 검토됨

2023~2028학년도 중기학생배치계획(일반학급 기준)                                            (단위: 명, 학급)

구분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	증감
학생수	389	370	340	316	283	260	△129
학급수	16	16	15	15	14	14	△2
급당학생수	24.3	23.1	22.7	21.1	20.2	18.6	△5.7

【 위치도 및 현장사진 】

위치도
현장사진

【 도평초등학교 본관 평면도 】

본관 1층 평면도

본관 2층 평면도

본관 3층 평면도

【 추진경과 및 향후 계획 】

추진경과 및 향후계획	내 용	비 고
2023. 6. ~ 2024. 2.	사전기획 용역 및 적정성 검토
2024. 6.	공공건축 심의
2024. 7. ~ 9.	설계(일반)공모 및 계약
2024. 10. ~ 2025. 5.	계획 및 실시설계
2025. 6.	유관기관 협의 및 일상감사 의뢰
2025. 7.	검토 및 발주
2025. 8. ~ 9.	조달계약
2025. 10. ~ 2027. 3.	시설 공사

【 사업비 산출서 】

구 분	항 목	산출기초
		단 가		수 량		금 액
공사비	기계실 및 주차장	2,210천원	×	845㎡	=	1,867,450
	홀 및 계단실, 연결통로	2,210천원	×	450㎡	=	994,500
	조리실	4,520천원	×	196㎡	=	885,920
	식당	2,210천원	×	280㎡	=	618,800
	필로티	552.5천원	×	360㎡	=	198,900
	강당 및 무대	3,320천원	×	880㎡	=	2,921,600
	화장실 및 샤워실	3,320천원	×	160㎡	=	531,200
	클라이밍실 및 기구보관실	3,320천원	×	45㎡	=	149,400
	엘리베이터 및 클라이밍 시설	156,000천원	×	1식	=	156,000
	설비시설 (전기, 방송, 소방 등)	1,260,000천원	×	1식	=	1,260,000
	부대정비 (암파쇄, 이전 등)	400,000천원	×	1식	=	400,000
소 계						9,983,770
용역비	사전기획비	40,000천원	×	1식	=	40,000
	설계비	479,000천원	×	1식	=	479,000
	설계공모비	47,900천원	×	1식	=	47,900
	설계의도구현비	47,900천원	×	1식	=	47,900
	감리비	620,000천원	×	1식	=	620,000
소 계						1,234,800
기 타	시설부대비 (인증비용 등)	116,000천원	×	1식	=	116,000
소 계						116,000
합 계						11,334,570