		2024년도 행정사무감사
		환경도시위원회

주 요 업 무 보 고

2024. 10.

(상하수도본부)

목    차

Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅱ. 2024년 비전과 목표

Ⅲ. 주요업무 추진상황

Ⅳ. 2023년 결산 및 2024년 예산집행상황

Ⅴ. 2022~2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅵ. 2024년 행정사무감사 자료

Ⅰ. 일 반 현 황

□ 기구 및 정․현원

2부 1단 9과

기   구

																		상하수도본부
																상수도부										하수도부									공공하수처리시설현대화사업추진단
		경영관리과														상수도정책시설과 상수도생산관리과 누수방지과										하수계획과 하수시설과 제주하수운영과 서귀포하수운영과									총괄과

정 ․ 현원

(’24. 8. 30. 기준)

구 분	총계	일 반 직									청원 경찰	공무직
		계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구직
정 원	268	168	1	3	9	44	43	47	14	7	28	72
현 원	257	162	1	3	9	55	61	20	6	7	27	68
과부족	△11	△6				11	18	△27	△8		△1	△4

□ 주 요 기 능

경영관리과

❍ 본부 소관 행정의 종합 기획 조정

❍ 상․하수도 공기업 특별회계 및 예․결산 운영

❍ 공기업 경영분석 및 경영합리화에 관한 업무

❍ 직원복무, 교육, 복리후생 등에 관한 사항

상 수 도 부

❍ 상수도 생산․공급 행정의 종합 기획 및 조정

❍ 식수원 개발 및 상수도공급계획 수립□시행

❍ 취□정수시설 운영 및 먹는 물의 수질관리

❍ 유수율 향상 대책 수립 및 누수방지사업 시행

하 수 도 부

□ 중장기 하수도 기본정책 및 광역 하수도정비 기본계획 수립

□ 하수처리장 및 소규모처리장 신·증설, 하수관로 정비사업 추진

□ 도시침수 대응을 위한 중점관리지역 하수관로 정비

□ 하수처리장 및 위생처리장 운영관리

공공하수처리시설 현대화사업 추진단

❍ 제주(도두) 공공하수처리시설 현대화사업 종합 기획과 조정

❍ 제주(도두) 공공하수처리시설 현대화사업 시행

❍ 제주(도두) 공공하수처리시설 주변지역 마을발전사업 추진

❍ 제주(도두) 공공하수처리시설 운영관리

□ 2024년 예산규모 : 5,619억원

(단위 : 억원)

구 분	'24년 1회 추경	'24년 본예산	증 감	주요내역('24년 1회 추경 기준)
합 계	5,619	5,381	증 238 (증 4.43%)
수도사업 공기업 특별회계	2,296	2,273	증 23 (증 1.0%)	세입	사용료	864	부담금	136
					국고보조	464	유보자금	80
					전입금	465	차입금	140
					기타	147
				세출	필수경비	886	균특이양	263
					국고사업	656	자산취득	23
					자체사업	453	예비비	15
하수도사업 공기업 특별회계	3,323	3,108	증 215 (증 6.9%)	세입	사용료	761	부담금	126
					국고보조	842	유보자금	189
					전입금	875	차입금	500
					기타	30
				세출	필수경비	1,211	민간자본	56
					국고사업	1,878	자산취득	11
					자체사업	154	예비비	13

□ 자산 ․ 채무(’23년 결산기준)

□ 자  산 : 24,408억원

(단위 : 억원)

구 분	합 계	상수도	하수도	비 고
계	24,408	9,239	15,169
토 지	400	185	215
건 물	410	74	336
구축물 등	23,598	8,980	14,618

□ 부  채 : 6,634억원

(단위 : 억원)

구 분	부채액			비 고
	합 계	차입금	BTL
계	6,634	3,510	3,124
상 수 도	1,186	1,186	-
하 수 도	5,448	2,324	3,124

□ 상·하수도 보급현황

□ 상수도 공급

구 분	시설용량 (톤/일)	연간 총 급수량(천톤)	1일 평균 급수량(톤)	연간 총 사용량(천톤)	1인 1일 사용량(ℓ)
’23년	512,552	158,489	434,216	85,920	336
’22년	530,439	164,461	450,580	87,596	343

□ 정수시설

(’23. 12. 31. 기준 / 단위 : ㎥/일)

구 분	정 수 시 설 별 현 황
	계	정수장	지하수	담수장	저수지	용천수
합 계	512,552	343,500 (17개소)	169,052 (301공)	(2개소)	(6개소)	(9개소)
광 역 상수도	223,000	223,000 (10개소)	(137공)	-	(2개소)	-
지 방 상수도	120,500	120,500 (7개소)	-	-	(4개소)	(9개소)
마 을 상수도	169,052	-	169,052 (164공)	(2개소)	-	-

※ 예비취수원(지하수 80개공, 88,702㎥/일) : 광역상수도(36공, 33,765㎥/일), 지방상수도(20공, 38,250㎥/일), 마을상수도(24공, 16,687㎥/일)

□ 상수관로

□ 관로별

(’23. 12. 31. 기준 / 단위 : ㎞)

구 분	총연장	도수관	송수관	배수관	급수관
합 계	5,905	78	502	2,004	3,321

□ 하수도 보급률

(’23. 12. 31. 기준)

구 분		계	제 주 시		서귀포시		비고
			동지역	읍면지역	동지역	읍면지역
인구 (명)	총 인 구	700,708	389,474	118,801	106,505	85,928
	처리인구	654,032	381,724	91,939	106,100	74,269
	보급률(%)	93.3%	98.0%	77.4%	99.6%	86.4%

□ 하수처리장

(’23. 12. 31. 기준)

시별	처리장명	시설용량 (톤/일)	처리공법	중계펌프장 (개소)	간이펌프장 (개소)	차집관로 (km)	비 고 (가동일)
계	8개소	266,000		124	540	379.9
제주시 (제주하수운영과)	제 주	130,000	MLE	15	129	54.8	’94. 3. 1.
	동 부	12,000	SBR	16	104	58.0	’07. 7. 1
	서 부	24,000	SBR	25	150	58.8	’07. 7. 1.
서귀포시 (서귀포하수운영과)	보 목	30,000	KSMBR	8	18	29.2	’96.12.30.
	색 달	23,000	MLE,DeNiPho	16	38	55.8	’83. 8.15.
	대 정	21,000	SBR,MSBR	15	35	38.0	’05. 4. 1.
	남 원	16,000	SBR	11	39	49.0	’08. 1.31.
	성 산	10,000	SBR	18	27	36.3	’05. 4. 1.

□ 하수발생 및 처리

(’23. 12. 31. 기준)

구 분		시설용량 (톤/일)A	유입 처리량 (톤/일)B	처리율 (%)C=B/A	비 고
계		266,000	251,494	94.5
제주시	동 지 역	130,000	139,313	107.2
	읍면지역	36,000	38,888	108.0
서귀포시	동 지 역	53,000	39,518	74.6
	읍면지역	47,000	33,775	71.9

□ 하수관로

(’23. 12. 31. 기준 / 단위 : ㎞)

구 분	계획연장 (A)	시설연장			시설율(%) C=B/A
		총계(B)	합류식	분류식
합 계	5,867	5,393	23	5,370	91.9%

Ⅱ. 2024년 비전과 목표

정책목표 및 전략

					상하수도본부
목표			깨끗한 물 공급과 공공하수도 인프라 확충으로 지속 가능한 미래 제주 실현
전 략 과 제							실 행 계 획
윤리경영·사회적가치 실현으로 공기업 경영혁신 체계 구축							▪재원확충, 부채감축, 비용절감으로 건전재정 운영 ▪윤리경영·사회적가치 실현 등 비재무적 지표 역량강화 ▪투명하고 공정한 계약을 통한 신뢰받는 행정 구축
안전하고 깨끗한 최상급 품질 수돗물 공급과 유수율 향상							▪안전하고 깨끗한 수돗물 생산·공급 및 엄격한 수질관리 ▪유수율 향상 단기 성과 도출을 위한 민선8기 유수율 제고 종합대책 마련 ▪가뭄 등 기후 위기 대응을 위한 대체취수원 개발 ▪지속적인 맑은 물 공급을 위한 신규정수장 추진
청정 제주 실현을 위한 혁신적인 공공 하수도 시스템 확대							▪장래 하수발생량 대비 하수처리장 적기 증설 ▪하수관로 정비를 통한 효율성 및 안전성 제고 ▪극한강우 대비 도시침수 대응사업 본격 추진 ▪도서지역 소규모 하수처리시설 스마트 기술 도입 ▪제주공공하수처리시설 현대화사업의 안정적 추진

Ⅲ. 주요업무 추진상황

1		윤리경영·사회적 가치 실현으로 공기업 경영혁신 체계 구축

❍ 사회적 책임을 다하며 고객의 가치를 중요시하는 공기업 경영

❍ 투명하고 공정한 행정서비스 제공으로 공기업 윤리경영 실천과    지역사회 발전 등 다양한 사회적 가치 및 신뢰행정 창출

□ 추진개요

❍ (경영합리화) 재원확충, 부채감축, 비용절감을 통한 공기업 건전재정 운영

❍ (사회적가치 윤리경영) 지속가능경영, 사회적가치 등 지역사회에 이바지하는 가치 중심의 공기업 경영체계 구축

❍ (신뢰받는 행정 구축) 투명하고 공정한 계약을 통한 청렴 행정 실현

□ 추진상황

❍ (재원확충) 국고보조금(1,172억) 투자재원 확보, 공공예금 관리, 원가절감 등

- (이자수익) 유휴자금의 정기예금 예치(260억) 등으로 세입 확충

* ('23. 8월) 1,320백만원 → ('24. 8월) 2,647백만원 (전년대비 100.5%↑)

- (원가절감) 태양광 활용·전력수요관리(동력비↓), 안전관리자 자체선임(인건비↓)

❍ (경영투명성 강화) 전문가 활용 결산 실시, 요금제도 정비로 법적 근거 강화

- ('23년 결산) 외부전문가의 업무 지원 및 회계감사를 통해 결산의 정확성 제고

- (요금제도 정비) 사회환경 변화를 반영한 감면 등 제도 정비

․ 기초생활수급자 수도요금 감면*, 중수도시설 감면 규정 내용 명확화('23.1월)

* ('23. 12월말 기준) 7,565가구 / 350백만원 감면

❍ (신뢰행정) 계약투명성 제고(특정업체 수의계약 집중 근절로 횟수 및 누적금액 제한), 하도급 지킴이 운영(하도급 업체와 근로자 노무비 직접지급)

❍ (경영효율화 제고) 중장기 경영관리계획 수립, 자산·부채관리 등

- (경영평가) '24년 하수도분야 “다”(3위)등급 결정, '25년 상수도분야 “나”등급 목표 추진

- (경영관리) '24~'28 하수도 중장기 경영관리계획 수립('24.5./18백만원, 한국수도경영연구소)

- (자산관리) 공유재산 실태조사 추진('24.6.~10.) 및 운휴자산 유상이관

* '23년 유상재산이관 : 2건·209백만원

- (부채관리) 부채규모 적정 관리를 위한 적기 상환('24. 상반기/356억)

* '24년 부채상환 : 692억(차입금 335억, BTL 357억) 상환

□ 추진계획

❍ (재원확충) 금리변동 반영 정기예금 예치, 합리적 자산관리, 원가절감 등

❍ (부채상환) 336억원(상수도 48억, 하수도 110억, BTL 178억) 상환 예정('24.말)

2		상수도 시설의 합리적인 설치·관리를 위한 계획 수립과 시설 확충

□ 갈수록 심화되는 기후 위기, 대규모 개발사업 증가 등 급변하는 사회변화에 선제적 대응 체계 구축

□ 추진방향

□ 2040 수도정비계획(변경)은 Zero Base에서 지역 여건을 반영하여 수립

□ 친환경 대체취수원 개발 등 도민에게 안정적인 수돗물 공급 기반 구축

□ 상수원보호구역 철저한 관리와 엄격한 수질검사로 먹는물 안전성 확보

□ 추진상황

□ (2040 수도정비계획 수립) 사업수행 능력 평가('24. 8.), 입찰 공고('24. 9.)

□ (공급시설 확충) 안정적인 공급기반 마련을 위한 시설 확충

- 친환경 대체 취수원 개발 : 취수원 4공(교래 2 광평 2) 추진(12월 준공 예정)

- 식수 전용 저수지 확충 : 배수지(동홍, 4천톤), 송·배수관로(3.6km) 추진

- 상수도 원인자부담금 사업 : 5건 추진 중(제주시 3, 서귀포시 2)

- 신규정수장(27천톤/일) 개발사업 : 기본 및 실시설계 행정절차 이행(’24. 9.)

□ (수질안전성 확보) 안전한 물 공급을 위한 취수원 ~ 공급단계 철저한 관리

- 상수원보호구역 내 불법행위 특별점검 : 11개소(제주시 8, 서귀포시 3)

- 상수원수·정수장 등 수질검사(4,370건), 수돗물 안심확인제(267건)

※ 정수장, 마을상수도 등 수돗물 수질 적합, 정수장 방사성물질·노로바이러스 불검출

□ (수돗물 음용·물 절약 홍보) 깨끗한 제주의 수돗물에 대한 인식 제고

- 물사랑 공모전 개최, 캠페인 실시('24. 3.), 홍보 동영상·카드뉴스 제작('24. 9.)

□ 추진계획

□ (2040 수도정비계획 수립) 계획(변경) 수립 및 기술진단 용역 시행(‘24. 9. ~ 26. 3.)

□ (공급시설 확충) 안정적 용수공급을 위한 상수도 시설 확충 추진

- 신규정수장 개발사업 실시설계 용역(‘24. 10. ~ ‘25. 9.)

- 취수원 4공(교래 2, 광평 2), 배수지(동홍, 4,000㎥), 송·배수관로(동홍, 서홍, 하효)(~ ‘24. 12.)

□ (홍보 강화) 제주의 수돗물 인식 제고를 위한 홍보(유튜브, 라디오 광고 등)

3		취․정수시설 현대화로 미래형 상수도 공급체계 구축

□  노후 수도시설 정비, 기능 개선으로 도내 17개 정수장 최적 운영체계 구축

□ 믿고 마실 수 있는 안전한 수돗물 공급으로 도민 물복지 향상

□ 추진방향

❍ 노후 정수장 시설개량으로 깨끗한 수돗물 안정적 생산․공급기반 마련

❍ 급수취약과 도서지역 항구적 물 문제 개선으로 안정적인 물공급

□ 추진상황

❍ (노후정수장 개량사업) 월산․별도봉 정수장 개량(137억 / '21. 11. ~ '24. 12.)

❍ (고도정수처리 확충) 조천․토평정수장 공사 추진중(779억/‘21. 1.~’26. 12.)

- 조천(Q=37천㎥/일, 공정율 20%), 토평(Q=12.4천㎥/일, 공정율 35%)

❍ (정수장 현대화) 강정정수장(Q=25천㎥/일) 공사 추진중(520억/'21.11. ~ '26.12./공정율 15%)

❍ (도서지역 정수장 개량과 증설) 실시설계 완료, 공사 착공(405억/‘24. 8.)

- 추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설(Q=3천㎥/일) 2024. 6월 공사 착수

- 가파·마라 해수담수화시설 개량 및 증설(Q=900㎥/일) 실시설계 추진중

❍ (비양도 해저관로 확충사업) 기본 및 실시설계용역 착수(106억원/'24. 8.)

❍ (농어촌 생활용수 급수취약지역 개선사업) 읍·면지역 14개 지구(공정율 65%, 58억)

□ 추진계획

□ (고도정수처리와 현대화사업) 조천․토평․강정정수장 659억원

- 토목공사 완료(’24년 말) 후 건축공사와 고도처리 공법 설비시설 ‘26년 완료

□ (도서지역 해수담수화 사업) 227억원(‘25년도 국비 119억원 확보)

- 추자: ’24년 하반기 공사추진, 마라·가파: 실시설계 및 행정절차 이행 '24. 11.

- 비양도: 해저 관로 확충사업 실시설계 용역과 주민설명회 개최

□ 급수 취약지역 개선과 관로 확충('24. 1. ~ 12.) : 58억원

- 읍·면지역 등 급수 취약지역 개선 관로공사 추진(L=19km)

□ 상수도 생산계통 기능 개선과 교체·정비·진단('24. 1. ~ 12.) : 55억원

- 정수시설 안전진단과 노후시설 교체, 소형생물 대응체계 구축(42억)

- 지하수 영향조사(120공)와 긴급 정비공사 추진(13억)

4		유수율 향상을 통한 지속 가능한 수자원 선순환 구축

□ 블록시스템 기반 체계적 누수관리 및 노후 상수관망 정비 등 효율적 관망관리 시스템 구축을 통한 수도사업 선순환 구조 구축

□ 추진개요

❍ (사업기간) ’16. ~ ’27년  * 유수율 목표 : (’16년) 46% → (’27년) 85%

❍ (사업규모) 상수관망 블록구축 378블록, 노후 상수관 정비 1,316㎞

❍ (총사업비) 8,816억원(노후관 정비 5,630억 포함), '24년까지 3,008억원 투자

(단위 : 억원)

재원별	총 계	기투자	2024년	2025년 이후
계	8,816	2,383	625	5,808
국 비	3,087	277	160	2,650
지방비	5,729	2,106	465	3,158

□ 추진상황

❍ (유수율 제고) 블록구축 378개소(100%) - 제주도 전 지역 완료

❍ (노후관 정비) 노후관 정밀조사 용역완료(‘22. 2.), 국비확보 절충 추진

- 애월읍 노후 상수관망 정비사업(‘23. ~ ’26./ 250억) 설계용역 착수(‘23. 6.)

- 구좌성산 노후 상수관망 정비사업(‘24. ~ ’29./ 460억) 기본 및 실시설계 추진(‘24. 6.)

❍ (유수율 향상방안 연구용역) 중간보고회(‘24. 3.), 완료 예정(‘24. 10.)

‧ 유수율 전문가와 함께하는 유수율 정책토론회 개최(’24. 8. 13.)

□ 추진계획

❍ (동지역 유수율 제고사업 추진) ‘25년 동지역 유수율 향상 집중 추진

- 블록구축 완료(‘23년), 관망정비 추진 등 유수율 제고 성과 창출

- 제주시 동지역(서부) 현대화사업 마무리와 서부지역 유수율 85% 달성

❍ (읍·면지역 유수율 관리) 조천 등 유수율 유지관리와 시설개선 지속 추진

❍ (노후 상수관망 정비사업) ‘25년 415억(국비 207.5억, 도비 207.5억)

- 애월읍 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 설계 완료(‘24. 10.)

- 구좌·성산 노후 상수관망 정비사업(‘24. ~ ‘29./ 460억) 추진

- 2025년 신규 노후상수관망 정비사업(4개사업)(‘25. ~ ‘30./ 1,837억) 추진

❍ (유수율 향상방안 연구용역) 민선8기 유수율 제고 추진 전략 수립(‘24. 10.)

5		장래 하수발생량 증가 대비 하수처리장 적기 증설

❍ 도시발전과 상주인구 유입 등 하수량 증가에 대비한 하수처리시설 증설

□ 추진개요 : 하수처리장 증설 150천톤(266천톤 → 416천톤)

(단위 : 천톤/일, 억원)

처리장	시설용량		총 사업비				사업기간	비 고
	현재	증설 후 (증설량)	계	기투자	’24년	향후
계	266	401(135)	6,148	1,172	950	4,026	'15.~'29.
제 주	130	220(90)	4,283	475	675	3,133	'19.~'28.	시공중 (공정률 13%)
동 부	12	24(12)	538	420	75	43	'17.~'25.	공사중지 (공정률 31%)
서 부	24	44(20)	484	277	192	15	'21.~'25.	시공중 (공정률 74%)
대 정	21	34(13)	423	-	8	415	'24.~'28.	'24. 신규사업 (실시설계 추진)
색 달	23	38(15)	420	-	-	420	'25.~'29.	'25 예산 편성 예정
남 원	16		-	-	-	-	'20.~'23.	증설준공 ('23.8.28.)
보 목	30		-	-	-	-	'18.~'20.	증설준공 ('20.7.31)
성 산	10		-	-	-	-	'15.~'17.	증설준공 ('17.12.20)

□ 추진상황

❍ (ʼ15. ~ ʼ23.) 서귀포지역 5개 처리장* 38.5천톤/일 증설 완료(1,428억)

* 색달(6.5천톤/118억), 보목(10천톤/674억), 대정(8천톤/270억) 성산(6천톤/157억), 남원(8천톤/209억)

❍ ('17. ~ '25.) 시공 중 3개소(제주, 동부, 서부), 신규 1개소(대정)

□ 추진계획

❍ (제주) 현대화사업 수처리시설(22만㎥/일) 완공('25. 12.), 전체 준공('27. 12.)

❍ (동부) '25. 12월 동부처리장 증설사업 준공 및 월정리 주민지원사업 추진

❍ (서부) '25. 12월 증설 가동 목표로 계획기간 내 완공 추진

❍ (대정) '25. 6월 실시설계용역 완료, '25. 10월 공사 발주 예정

❍ (색달) '25. 2월 실시설계용역 발주

6		하수관로 정비를 통한 효율성 및 안전성 제고

❍ 안정적 하수이송 시스템 구축을 위한 차집관로 및 중계펌프장 개량 시급

❍ 하수관로 정비 및 노후 차집관로 개량으로 안정적 하수 이송

□ 추진개요

□ (사업기간) 1996.~2040. (사업량) 신설·개량 6,724㎞ (사업비) 45,319억원

(단위 : km, 억원)

구 분	전체계획 (‘96~’40년)		‘22년까지 실적		‘23년 실적		‘24년 계획		향후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합 계	6,724	45,319	5,333	20,500	60	918	30	515	1,301	23,386
재 정	6,153	41,403	4,762	16,584	60	918	30	515	1,301	23,386
B T L	571	3,916	571	3,916	-	-	-	-	-	-

□ 추진상황

□ ('23년 하수관로 신설 및 교체 추진) 24개사업·60km·847억원

- (제주시) 도두, 이호처리분구, 오라·아라, 서부, 조천, 하귀2리 등

- (서귀포시) 성산, 대정, 남원, 중문, 예래·대륜, 서홍·동홍, 보목·토평 등

□ ('23년 노후차집관로 정비를 위한 실시설계용역 등 추진) 6건, 71억원

- 제주시 3건(동지역, 서부, 동부) 33억원,  서귀포시 3건(동지역, 남원, 성산) 38억원

□ ('24년 노후차집관로 정비 등 신규사업 국고보조 예산 확보) 2건, 17억원

- 서귀포시 대정처리구역, 대정하모 도시침수

□ 추진계획

□ ('24년 하수관로 정비사업 추진) 15개사업·23km·440억원

- (제주시) 도두, 이호처리분구, 오라·아라, 서부, 조천, 월평동 등

- (서귀포시) 성산, 남원, 중문, 예래·대륜, 서홍·동홍, 보목·토평, 대정하모 등

□ ('24년 차집관로 정비 실시설계용역 등 추진) 8건·7km·75억

- 제주시 3건(동지역, 서부, 동부) 33억원,  서귀포시 5건(동지역, 남원, 성산, 대정2) 42억원

7		하수처리 효율 증대를 통한 안정적인 하수처리장 운영

❍ 수처리 공정과 노후 하수처리시설 개선을 통한 하수처리 효율 증대

❍ 증가하는 하수유입 부하량에 대비 안정적 하수처리 시스템 구축운영

□ 추진개요

❍ (운    영) 하수처리장 8개소(제주, 동부, 서부, 보목, 색달, 대정, 남원, 성산),소규모 하수처리시설 26개소

❍ (사업기간) '24. 1월 ~ 12월

❍ (소요예산) 467억 원

❍ (사업내용) 시설개선(194억원), 슬러지 처리(132억원), 수처리 컨설팅(22억원), 원격관리체계 구축(79억원), 관리대행 시범사업(40억원)  등

□ 추진상황

❍ (처리장 운영관리) 안정적 시설관리(연중)

- 전기·소방시설물 : 월1회 전문업체 점검으로 안정적 유지관리

- 수질원격감시시스템(TMS) 주2회, 악취 주1회 전문업체 점검으로 안정적 유지관리

❍ (노후시설 개선) 하수처리효율 향상(연중)

- 펌프장 월류수 처리시설 정비 및 협잡물 탈수기 시설 설치

- 펌프장 제어반, 협잡물 스크린, 배관, 오수펌프 등 시설 교체

❍ (하수슬러지처리) 안정적 수질확보(연중)

- (제주시) 제주 115톤/일(자원화 50톤, 도외 65톤), 동·서부 35톤/일(도외)

- (서귀포시) 5개 처리장 53톤/일(도외)

❍ (수처리 컨설팅) 유입하수 증가에 따른 최적의 수처리 컨설팅 운영(연중)

- 전문인력(24명/제주시 15, 서귀포시 9) 상주, 수질 관리 등 수처리 운영

❍ (소규모처리시설 관리 개선) 실시간 감시 및 제어를 통한 안정적 하수처리

- 도서지역 13개소 소규모하수처리시설 원격관리체계 구축

❍ (관리대행 시범사업) 민간 전문기술 인력 활용한 안정적 하수처리 운영

- 대상시설 : 보목·색달하수처리장(37명) 상주, 수질 관리 등 수처리 운영

8		공공하수처리시설 관리대행 시범사업을 통한 효율적 운영‧관리

□ 하수처리인구의 증가 및 공공하수처리시설의 고도화로 전문인력의 필요성 대두

□ 전문 기술인력을 보유한 민간부분 관리‧운영기법 도입으로 공공하수처리시설 운영 효율 제고

□ 추진개요

□ (사 업 명) 서귀포지역 공공하수처리시설 관리대행 시범사업

□ (사업기간) '24. 1월 ~ '26. 12월

□ (대상시설) 보목 및 색달 공공하수처리시설(중계펌프장 및 차집관로 포함)

□ (소요예산) 4,728백만원(연간)  *3년간 14,185백만원

□ 추진상황

□ ('22.8.~12.) 공공하수처리시설 관리대행 시범사업 타당성조사 용역 실시

□ ('23.10.27.~11.17.) 기술제안서 제출 사전규격 및 입찰공고

□ ('23.11.22.) 우선협상대상자 선정(주식회사 이산 컨소시엄)

□ ('23.12.13.) 관리대행 협약 체결

□ ('24. 1. 1.) 관리대행 시범사업 시행

□ 추진계획

□ (공공하수처리장 효율적 운영관리 방안 마련) 보목․색달처리장 관리대행 시범사업 성과분석 후 점진적 확대 또는 관리공단 추진 등 효율적 관리방안 마련

□ (하수처리 효율성 증대) 우수 전문인력 확보 활용, 운영관리의 전문성 제고, 민간 경영기법 도입 지역인력 양성 및 유지관리비 절감 등 효율성 향상

9		청정제주 실현을 위한 제주공공하수처리시설 현대화사업 추진

❍ 제주하수처리장의 하수량 증가와 시설 노후화에 따른 수질기준 초과와 악취문제 해결로 청정제주 보존과 주민의 삶의 질 개선

□ 추진개요

❍ (사업기간) ’19. ~ ’27년

❍ (총사업비) 4,283억원(국비 2,014, 지방비 2,269)

❍ (시설용량) 하수처리시설 현대화 22만㎥/일(기존 13만, 증설 9만)

❍ (주요시설) 하수처리시설(22만㎥), 분뇨전처리시설(400㎥), 하수찌꺼기 처리시설(150톤), 해양방류관로(L=1.5km), 생태공원 조성 등

* 무중단 공법 도입, 처리시설의 완전 지하화로 악취 원천 차단과 상부 공원화

□ 추진상황

❍ (’18. 6. 8.) 제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획(변경) 승인(환경부)

❍ (’19. 1.29.) 국가균형발전 프로젝트사업 선정(기재부, 예타 면제)

❍ (’19. 8.22.) 사업계획 적정성 검토(KDI)

❍ (’22. 2.25.) 신규 입찰공고(설계‧시공 일괄 입찰방식)

❍ (’22. 3.31.~ ’23. 1.9.) 기본설계 및 실시설계

❍ (’23. 1.~ ’23. 4.) 착공前 주요 인‧허가 등 행정절차 이행

❍ (’23. 4.28.) 시설공사 착공     * 전체 공정율(‘24. 8월말 기준): 13.2%

❍ (’24. 7.15.) 어업피해조사용역 착수

□ 추진계획

❍ (어업피해) ’25. 7. 어업피해조사 완료, ’25. 12. 어업피해보상 완료

❍ (시설공사) ‘25년말 수처리시설(22만㎥/일) 완공‧운영, ’28. 1. 전체시설 완공

❍ (재원확보) 계획기간 내 차질 없는 완공을 위한 국비 확보 절충 강화

Ⅳ. 2023년 결산 및 2024년 예산집행상황

2023년 결산 및 2024년 예산집행 상황

□ 2023년도 결산내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용율
합 계	602,833	517,647	67,221	17,965	3.0%
수도사업 특별회계	238,973	203,518	26,874	8,581	3.6%
하수도사업 공기업특별회계	363,860	314,129	40,347	9,384	2.6%

□ 2024년도 예산 집행상황 (‘24. 8. 31기준)

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산현액	집행액	잔 액	집행율	비 고
합 계	629,075	367,877	261,198	58.5%
수 도 사 업 특별회계	256,444	148,573	107,871	57.9%	·이월사업비 26,874백만원 포함
하 수 도 사 업 공기업특별회계	372,631	219,304	153,327	58.9%	·이월사업비 40,347백만원 포함

Ⅴ. 2022~2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2022년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현   황

(2024년 8월 31일 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	17	7	10	0
상하수도본부(공통)	2	2	-	-
경영관리과	2	1	1	-
상수도부	2	1	1	-
하수도부	7	1	6	-
하수도부, 현대화추진단	2	1	1	-
현대화사업추진단	2	1	1	-

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 행정사무감사 지적사항 처리결과를 상세히 기술하고, 면밀히 검토하여 추진·완결·추진불가 여부를 명확히 작성할 것.	완결
2	○ 행정사무감사 자료 요구에 대하여 누락 및 부실한 자료 제출되지 않도록 충실히 작성할 것.	완결
3	○ 2022년 감사원 감사 결과 기초생활수급자 등에 대한 수도요금 감면 혜택을 관련 법령 개정이후 10여년간 미이행하고 있어 조례 개정 등을 통한 개선방안을 마련할 것.	완결
4	○ 상하수도본부와 행정시 상하수도과 조직이 이원화되어 사고 시 컨트롤타워 부재 및 시설물 관리에 따른 부서책임 경계도 불분명하여 조직 통합 등을 효율적인 방안을 검토할 것.	추진중
5	○ 유수율 제고사업 목표연도가 계속 늦춰지고 있어 계획 기간 내에 목표 유수율을 달성할 수 있도록 하고 국비 확보에도 적극 노력 할 것.	추진중
6	○ K-water에서 공기관대행으로 수행하고 있는 유수율 제고사업 중 일부 지역이 협약기간 만료에도 불구하고 목표 유수율 미달성으로 인해 마무리 되지 않고 있어 협의를 통해 사업 마무리를 위한 대책을 마련할 것.	완결
7	○ 도내 공공하수처리시설의 효율적 관리를 위하여 전문 인력과 기술력 등을 보유한 민간업체에 위탁하는 방안을 검토할 것.	추진중
8	○ 불명수 유입 차단을 위한 TF팀 구성 후 실적이 미미하여 조직 활성화를 위한 점검이 필요하며, 오접 실태 조사 등을 통해 불명수 유입의 명확한 원인 분석과 대책을 마련할 것.	추진중
9	○ 도내 하수처리장 용량은 포화되고 주민반대로 인한 증설사업은 지역되고 있어 적극적인 주민 협의와 충분한 보상 등을 통해 신속히 사업을 추진해 나갈 것.	추진중
10	○ 중계펌프장 월류수 처리시설 사업이 지역주민 반대 및 예산 미확보 등으로 추진이 지연되고 있어 예산 확보 및 주민홍보 등을 통해 사업이 추진될 수 있도록 적극 노력할 것.	추진중
11	○ 하수처리구역 외 지역에 대한 하수관거 연결 불가에 따른 민원이 급증하고 있어 이에 대한 개선대책을 마련할 것.	추진중
12	○ 민간위탁 조례에 따라 도의회의 동의를 받은 때로부터 3년이 경과한 후 재위탁 또는 재계약을 할 경우 도의회의 동의를 받아야 하나 일부 이행이 안된 사업이 있어 절차 이행에 철저를 기할 것.	완결
13	○ 하수처리장 재이용수 시설용량 대비 이용률은 저조하고 유지관리 비용은 계속 늘어가고 있어 재이용수 활용방안을 다각적으로 검토할 것.	추진중
14	○ 애조로 개설사업 시 삼양동 일부지역 오수관로 매설 요청에 대해 과거 행정에서는 도로개설 사업과 병행하여 매설을 약속하였으나, 이행 요구에 대해 현재는 사실상 불가하다는 번복 행정으로 도민들이 피해를 보고 있는바, 행정의 일관성과 연속성 등을 고려하여 약속 이행 방안을 마련할 것.	완결
15	○ 하수슬러지 지속 증가로 인한 처리 비용이 계속 증가하고 있어 자원화 할 수 있는 다양한 방안을 강구할 것.	추진중
16	○ 제주공공하수처리시설 현대화사업에 검토 중인 재이용수 시설 22천톤/일에 대해 경제성 논리 등 논리 개발을 통해 미설치 방안을 마련할 것.	완결
17	○ 도두현대화사업 추진 시 피해를 입는 인근 지역 주민들의 관광자원 및 주민소득 창출을 위한 방안이 마련될 수 있도록 노력할 것.	추진중

2022년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

시정 및 처리요구사항
공통1. 행정사무감사 지적사항 처리결과를 상세히 기술하고, 면밀히 검토하여 추진·완결·추진불가 여부를 명확히 작성할 것. 공통2. 행정사무감사 자료 요구에 대하여 누락 및 부실한 자료 제출되지 않도록 충실히 작성할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 행정사무감사 지적사항 처리계획 작성관련 본부장 주재 상하수도본부 주간회의 시 업무연찬 실시('22.11.26.) - 본부내 과장(경영관리과 팀장 이상) 등 총 20명 참석 - 지적사항에 대하여 신속하게 후속조치 마련 - 지적사항 처리결과 상세히 기술 및 자료 요구 충실히 작성 등 □ 매주 본부장 주재 업무연찬 실시 □ 향후계획 □ 부서별 업무연찬 실시(본부장 요청사항 전파) □ 향후 지적사항 처리결과 작성시 완결·추진중·추진불가 여부에 대하여 부서장 및 본부장 보고 후 처리결과 작성 □ 행정사무감사 자료 요구 건 제출 전 부서장 검토 철저
담당부서	상하수도본부 경영관리과(☎ 750-7710) 상하수도본부 상수도부 정책시설과(☎ 750–7810) 상하수도본부 하수도부 하수계획과(☎ 750–7950) 상하수도본부 공공하수처리시설 현대화사업추진단(☎ 750-7711)

시정 및 처리요구사항
3. 2022년 감사원 감사 결과 기초생활수급자 등에 대한 수도요금 감면 혜택을 관련 법령 개정이후 10여년간 미이행하고 있어 조례 개정 등을 통한 개선방안을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 감사원 실태점검: '21. 7.~9월 ❍ (통보사항) 상수도요금 감면제도 운영 미흡('22. 5. 23.) ❍ (통보내용) ① ｢수도법｣ 개정(2010. 5.) 수급자 등 취약계층 수도요금 감면 근거 마련 ② ｢제주특별자치도 수도급수 조례｣에 수급자 감면 규정 미반영 ③ 관련 조례 제·개정을 통한 복지 사각 해소 방안 마련 통보 □ 추진상황 ❍ ｢수도급수조례｣ 일부개정조례안 입법계획 수립: '22. 7. 18. * 입법예고(`22.7.20.~8.11.), 법제심사(`22.8.24.) → 법제부서 검토의견 : 사전 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 이행 후 추진이 바람직함 ❍ 긴급사유소명서 첨부 사회보장제도 신설 협의 요청(본부→보건복지부) : '22.10.28. ❍ 사회보장제도 신설 협의 컨설팅 실시(한국보건사회연구원): '22.11.02. ❍ 사회보장제도 신설 협의결과 통보 (보건복지부→본부): '22.11.28. ❍ 수급자 감면 조항 신설 ｢수도급수조례｣ 일부개정조례안 개정 : '22.12.30. ❍ 시행규칙 개정 후 기초생활수급자 수도요금 감면 추진: '23.01. ~
담당부서	상하수도본부 경영관리과 (☎ 750-7710)

시정 및 처리요구사항
4. 상하수도본부와 행정시 상하수도과 조직이 이원화되어 사고 시 컨트롤타워 부재 및 시설물 관리에 따른 부서책임 경계도 불분명하여 조직 통합 등을 통한 효율적인 방안을 검토할 것.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 조직현황 □ (조직이관) '17. 7월(상하수도본부 지역사업소 → 행정시 상하수도과) □ (행정시 조직규모) * 2022년 기준 - 제 주 시 : 도시건설국 상하수도과(61명) - 서귀포시 : 안전도시건설국 상하수도과(44명) □ (이관업무) 요금 부과․징수, 개인급수공사, 배․급수관 유지보수, 배수설비 설치, 공공하수도 인허가, 개인하수처리시설 지도점검 등 □ 추진상황 □ 2022~2026 중기기본인력운용 계획(조직부서) 반영요청 : '22. 2. 8. - 행정시 상하수도과 통합 후 경영관리부 신설(경영관리과, 제주․서귀포지역 상하수도과) □ 2022년 상반기 자체 조직진단 실시 : '22. 3. 17. - 행정시 상하수도과를 상하수도본부로 흡수통합 - 경영관리과 + 행정시 상하수도과 → 경영관리부·민원대응과(민원총괄팀, 민원대응팀) 신설, 제주․서귀포지역 상하수도과 개편 * 1부 1과 2팀 신설, 2과 개편(행정시 → 상하수도본부) □ 상하수도본부 조직개선 의견 논의(본부+조직부서) : '22. 4., '22. 7. □ 행정시 상하수도 업무 통합 의견 보고(민선8기 인수위원회 업무보고) : '22. 6. □ 2023년 본부 조직진단 의견 제출 : '23. 9. □ 향후계획 □ 상하수도본부 조직개편(안) 반영 지속요구(본부 → 조직부서)
담당부서	상하수도본부 경영관리과 (☎ 750-7710)

시정 및 처리요구사항
5. 유수율 제고사업 목표연도가 계속 늦춰지고 있어 계획 기간 내에 목표유수율을 달성할 수 있도록 하고 국비 확보에도 적극 노력 할 것.
처리결과	완결 ( ), 추진중 (○), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ ʼ15. 8월 도 감사위원회 지적 (ʼ13년 유수율 통계 정정발표/(76.9%→44%)) □ 유수율 제고 종합대책 수립(ʼ16. 3.): (ʼ15년) 44.5 % → (ʼ25년) 85% - 사업량/사업비: 블록구축 332블록, 관망정비 725㎞ / 3,934억원 □ 유수율 제고사업 추진: 유수율 ʼ16년(45.7%) → ʼ21년(51.8%) - (ʼ16~ʼ21년) 읍면지역 유수율제고사업 추진, 1,027억원 투입 - (ʼ20~ʼ26년) 동지역 유수율제고사업 k-water 위수탁, ʼ22년까지 768억원 투입 □ 도 전역 노후상수관로 정밀조사 용역실시: ʼ20년 ~ ʼ21년 □ 유수율 목표달성을 위한 상수도 유수율 제고 종합대책 재정비(‘22.8.) - ʼ25년→ʼ27년, 3,934억원→8,816억원(노후관 국비 반영), 노후관 725㎞→1,316㎞ □ 효율적인 유수율 향상방안 연구용역 추진 중(ʼ23. 8. ~ ʼ24. 10.) □ ‘23년~‘26년 노후상수관로(애월) 정비사업 추진(249억원, 국비 134, 도 115) □ ‘24년~‘30년 노후상수관로(구좌·성산) 정비사업 추진(460억원, 국 230, 도 230) □ ‘25년 노후 상수관망 정비사업 국비지원 사업 반영(4개 사업, 1,837억원) - 제주시 영평중B/L, 사라·별도봉중B/L, 서귀포시 동홍·삼매봉중B/L, 남원대B/L □ 향후계획 ❍ 유수율 향상방안 연구 용역 결과를 반영하여 유수율 제고 계획 재수립
담당부서	상하수도본부 상수도부 누수방지과(☎ 750 - 7912)

시정 및 처리요구사항

6. K-water에서 공기관대행으로 수행하고 있는 유수율 제고사업 중 일부지역이 협약기간 만료에도 불구하고 목표 유수율 미달성으로 인해 마무리 되지 않고 있어 협의를 통해 사업 마무리를 위한 대책을 마련할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 한림·한경 유수율 제고사업 대행협약(도 ↔ K-water): ʼ17. 2.

□ 대정·안덕 유수율 제고사업 대행협약(도 ↔ K-water): ʼ18. 2.

□ 사업기간 종료 및 성과판정(목표 유수율 70% 미달): ʼ21. 12.

- (성과판정 최종 유수율) 한림·한경 67.2%, 대정·안덕 64.8%

- 목표유수율 미달성에 따른 K-water 신규사업 제안협의: ʼ22.10.~11.

• K-water 목표유수율 70% 미달성에 대한 책임을 인정하고, 미달성에 대한 대안으로 ’23년 무상 기술지원(장비지원, 기술인력 투입, 관망분석 등) 협의

• 목표유수율을 65%로 조정하고 최소사업비(표준사업비 52억 → 30억원 제안)로 단년도(1년) 신규사업을 제안하고, 위탁수수료는 전액 미반영 협의(목표유수율 미달성 시 차등 정산)

< 한림·한경 / 대정·안덕 유수율 제고관리>

• 사업대상: 한림·한경, 대정·안덕 전 지역

• 사업기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

• 사 업 비: 30억원(공기관 대행사업) ※ 위탁수수료 8% 전액 미반영

- 단, 道에서 소규모 수압, 유량 감시시설 발주(10억원)

• 사업목표: 유수율 65% 이상 달성 (미 달성 시 사업비 차등 정산 방식)

□ K-water 신규사업 제안내용 성과판정위원회 심의(적정): '22. 11. 8.

□ 신규사업 공기관대행사업 도의회 안건 보고: '22. 12. 1.

□ 기존사업 마무리(정산) 및 신규사업 공기관대행 협약체결: '22. 12.

□ 신규사업(한림·한경, 대정·안덕) 공기관대행사업 착수: '23. 01.

- ('23. 11. 21.) 유수율 성과판정 심의: 불합격(유수율 산정자료 판정 유보)

- ('24. 02. 28.) 유수율 성과판정 재심의: 적정(심의위원 전원 적정 판정)

- (목표 유수율) 65% →  (성과 판정 유수율) 66.2%(’24. 12월까지 유수율 65% 이상 유지관리)

담당부서

상하수도본부  상수도부  누수방지과(☎ 750 - 7912)

시정 및 처리요구사항

7. 도내 공공하수처리시설의 효율적 관리를 위하여 전문 인력과 기술력 등을 보유한 민간업체에 위탁하는 방안을 검토할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 공공하수처리시설 현황

구 분	계	제 주 시				서 귀 포 시
		소 계	제 주	동 부	서 부	소 계	보 목	색 달	대 정	남 원	성 산
시설용량 (톤/일)	266,000	166,000	130,000	12,000	24,000	100,000	30,000	23,000	21,000	16,000	10,000
처리방법	5개공법	2개공법	MLE	SBR ICEAS	SBR ICEAS	3개공법	KSMBR (막공법)	A2O공법, 데니포	SBR ICEAS	SBR ICEAS	SBR ICEAS
중계펌프장	124	56	15	16	25	68	8	16	15	11	18
간이펌프장	540	383	129	104	150	157	18	38	35	39	27
차집관로	379.9	171.6	54.8	58.0	58.8	208.3	29.2	55.8	38.0	49.0	36.3

□ 추진상황

□ 서귀포지역 공공하수처리시설(보목·색달) 관리대행 시범사업 시행

- '22. 8월~12월 공공하수처리시설 관리대행 시범사업 타당성조사 용역 실시

- '23. 10월~11월 기술제안서 제출 사전규격 및 입찰공고

- '23. 11. 22. 우선협상대상자 선정((주) 이산 컨소시엄)

- '23. 12. 13. 서귀포지역 공공하수처리시설(보목·색달) 관리대행 시범사업 협약 체결

- '24. 1. 1. 관리대행 시범사업 시행

□ 향후계획

□ (공공하수처리장 효율적 운영관리 방안 마련) 보목․색달처리장 관리대행 시범사업 성과분석 후 점진적 확대 또는 환경공단 추진 등 효율적 관리방안 마련

□ (하수처리 효율성 증대) 우수 전문인력 확보 활용, 운영관리의 전문성 제고, 민간 경영기법 도입 지역인력 양성 및 유지관리비 절감 등 효율성 향상

담당부서

상하수도본부 하수도부 서귀포하수운영과(☎ 750-7601)

시정 및 처리요구사항
8. 불명수 유입 차단을 위한 TF팀 구성 후 실적이 미미하여 조직 활성화를 위한 점검이 필요하며, 오접 실태 조사 등을 통해 불명수 유입의 명확한 원인 분석과 대책을 마련할 것
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 오수관로 유입수(빗물 등) 원인 □ 합류식 및 분류식 하수관로 혼재로 우천 시 오수관로에 빗물 유입 □ 분류식 하수관로 정비 시 기존 건축물의 오접조사가 미흡하고, 개인이 배수관로 신규 설치 시 우수관을 오수관로에 연결 □ 신축 건축물 배수설비 준공검사 시 오접여부 확인 소홀 등 □ 지금까지 추진상황 □ 불명수 차단 T/F팀 구성 및 운영: '20. 2. □ 배수설비 설치신고 및 준공검사 업무 개선방안 마련: '20. 9 □ 노후 하수관로 정밀조사를 통해 유입수 경로조사 및 불명수 유입 차단 - 제주영어교육도시, 신화역사공원 내 기 준공 배수설비 - 하천(동홍천)내 매설된 차집관로에 하천수 유입 보수 추진(ʼ20 ~ ʼ22) - 대정읍 관내 불명수(해수) 유입구간 보수 추진(ʼ20 ~ ʼ22) - 하수관로 기술진단: 9건 (ʼ22년 3, ʼ23년 1, ʼ24년 5) □ 배수설비 준공검사 개선을 위한 하수도 사용 조례 개정: '22. 11. 23. □ 노후 차집관로 정비사업 추진('20 ~ '28): 7건, 2,659억원 - (제주) 22.1㎞·펌프장 개량 2개소·334억원, (서부) 34.3㎞·펌프장 개량 22개소·448억원, (동부) 36.5㎞·펌프장 개량 7개소·413억원 (서귀포 동지역) 35.7㎞·펌프장 개량 5개소·436억원, (성산) 22.0㎞·펌프장 증설 5개소·192억원, (남원) 14.8㎞·펌프장 개량 9개소·202억원 (대정) 51.8㎞·펌프장 증설 5개소·634억원 □ 향후계획 □ 노후 하수관로 CCTV 정밀조사 및 불명수 유입 원인 분석 □ 불명수 유입 구간 보수 및 노후 차집관로 정비사업 지속 추진
담당부서	상하수도본부 하수도부 하수계획과(☎ 750-7950)

시정 및 처리요구사항

9. 도내 하수처리장 용량은 포화되고 주민반대로 인한 증설사업은 지연되고 있어 적극적인 주민 협의와 충분한 보상 등을 통해 신속히 사업을 추진해 나갈 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진개요

□ 하수처리장(8개) 증설 150천톤(266천톤 → 416천톤)

(단위 : 천톤/일, 억원)

처리장	시설용량		총 사업비				사업기간	비 고
	현재	증설 후 (증설량)	계	기투자	’24년 (추경반영)	향후
계	266	416(150)	6,148	1,172	950	4,026	'15.~'29.
제 주	130	220(90)	4,283	475	675	3,133	'19.~'28.	시공 중 (공정률 13%)
동 부	12	24(12)	538	420	75	43	'17.~'25.	공사중지 (공정률 31%)
서 부	24	44(20)	484	277	192	15	'21.~'25.	시공중 (공정률 74%)
대 정	21	34(13)	423	-	8	415	'24.~'28.	'24. 신규사업 (실시설계 추진)
색 달	23	38(15)	420	-	-	420	'25.~'29.	'25 예산 편성 예정
남 원	16		-	-	-	-	'20.~'23.	증설준공 ('23.8.28.)
보 목	30		-	-	-	-	'18.~'20.	증설준공 ('20.7.31)
성 산	10		-	-	-	-	'15.~'17.	증설준공 ('17.12.20)

□ 추진상황

❍ (ʼ15.~ʼ23.) 서귀포지역 5개 처리장* 38.5천톤/일 증설 완료(1,428억원)

- 색달(6.5천톤/ 118억), 보목(10천톤/ 674억), 대정(8천톤/ 270억) 성산(6천톤/ 157억) 남원(8천톤/209억원)

❍ ('17.~'25.) 시공 중 3개소(제주, 동부, 서부), 설계 중 1개소(대정)

□ 향후계획

❍ (제주) 현대화사업 수처리시설(22만㎥/일) 완공(‘25. 12.), 전체 준공(‘28. 1.)

❍ (동부) '25. 12월 동부처리장 증설사업 준공 및 월정리 주민지원사업 추진

❍ (서부) '25년 시범운영(9~11월) 및 준공(12월)

❍ (대정) '25. 6월 실시설계용역 완료, '25. 10월 공사 발주 예정

❍ (색달) '25. 2월 실시설계용역 발주

담당부서

상하수도본부 하수도부 하수계획과 (☎ 750-7950)

시정 및 처리요구사항

10. 중계펌프장 월류수 처리시설 사업이 지역주민 반대 및 예산 미확보 등으로 추진이 지연되고 있어 예산 확보 및 주민홍보 등을 통해 사업이 추진될 수 있도록 적극 노력할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진배경 ⇨ 「하수도정비기본계획 수립 지침(’20.5.18. 환경부)

□ 강우시 시설개선 및 운전개선을 통해 최대처리능력을 확보하여 오염부하 삭감 제고, 미처리 하수가 발생하지 않도록 정비계획 수립

□ 사업개요

□ (사업량) 하수도 월류수 처리시설 14개소(Q=270천톤/일)

□ (사업비 / 사업기간) 18,912백만원 / 2016 ~ 2027  (단위 : 톤/일, 백만원)

구 분	전체계획		‘23년까지 실적		‘24년 계획		향후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합 계	270,480	18,912	105,480	7,502	16,200	2,550	148,800	8,860
국 비		8,591		1,745		1,275		5,571
지방비		10,321		5,757		1,275		3,289

□ 추진상황

□ ('16.∼'21.) 하수도 월류수 처리시설 설치(5개소, Q=105,480톤/일) 가동 중

- 미수 중계(Q=4,700㎥/일, 700백만원), 제주항 3부두(Q=22,000㎥/일, 1,097백만원), 병문 중계(Q=33,900㎥/일, 2,392백만원), 화북 중계(Q=22,560㎥/일, 1,338백만원) 자구리 중계(Q=22,560㎥/일, 1,338백만원)

□ ('23. 7.) 도 광역 하수도정비 기본계획(변경) 환경부 승인

- 하수도 월류수 처리시설 정비(9개소, Q=165,000톤/일, 12,119백만원)

□ 향후계획

□ ('24. 1.∼12.) 신시가지, 중문동부 월류수처리시설(Q=16,200㎥/일, 2,550백만원) 공사 추진

- 신시가지 중계(Q=9,800㎥/일, 1,656백만원), 중문동부(Q=6,400㎥/일, 894백만원),

❍ ('25.∼'27.) 하수도 월류수처리시설(7개소, Q=148,800톤/일) 설치 가동

- 제주(도두, 삼양, 용담), 서부(애월, 한림), 대정(동일, 하모)

담당부서

상하수도본부 하수도부 서귀포하수운영과(☎ 750-7601)

시정 및 처리요구사항

11. 하수처리구역 외 지역에 대한 하수관거 연결 불가에 따른 민원이 급증하고 있어 이에 대한 개선대책을 마련할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 하수도 설치규정

구 분	면적 (비율)	하수도법	도시계획조례 개발행위 허가기준
			제주시 동지역	그 외 지역
하수처리구역 內	210.02㎢ (11.4%)	공공하수도 유입(제27조)	하수도법에 따른 배수설비의 설치 등
하수처리구역 外	1,636.98㎢ (88.6%)	개인오수처리 시설 설치 (제34조)	하수도법에 따른 개인하수처리시설의 설치

※ 하수처리구역에서만 건물·시설에서 발생하는 하수를 공공하수관로에 유입할 수 있음.

□ 개선대책

□ 하수처리구역 점진적 확대를 통한 공공하수도 연결 유도 추진

□ 하수처리구역 설정기준 ⇨ 하수처리구역 설정 승인권자 환경부장관

□ 집단적으로 하수가 발생하는 도시지역(주거·상업·공업·자연녹지 內 취락지구) 및 관리지역(계획관리 內 취락지구)  우선 지정

□ 경제성 및 환경성 비교·검토하여 공공하수도 연계처리(하수처리구역 內 지역) 또는 개별처리(하수처리구역 外 지역) 결정

□ 추진상황

□ (’23.07.13.) 도 광역 하수도정비 기본계획(변경안) 환경부 승인

□ (’23.10.27.) 지하수 보전을 위한 하수처리 추가 구역도 작성 완료

□ (’23.11.16.) 하수처리구역 부분변경을 통해 하수처리구역 추가 지정

□ 향후계획

□ 지하수 수질보전을 위한 하수처리구역 점진적 확대 추진

담당부서

상하수도본부 하수도부 하수계획과(☎ 750-7951)

시정 및 처리요구사항

12. 민간위탁 조례에 따라 도의회의 동의를 받은 때로부터 3년이 경과한 후 재위탁 또는 재계약을 할 경우 도의회의 동의를 받아야 하나 일부 이행이 안된 사업이 있어 절차 이행에 철저를 기할 것

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 민간위탁 사무 의회 동의(보고)현황

사업명	협약기간	의회 동의(보고) 일자
광역하수 슬러지 자원화시설 민간위탁	‘16.5.~’18.4.	‘16.7.12(경과조치*)
	‘20.5.~’22.4.	’20.3.24.(재계약 보고)
	‘22.5.~’24.12.	’22.2.17.(의회동의)
제주시 지역 위생처리장 민간위탁	‘16.1.~’16.12.	‘16.7.12(경과조치)
	‘20.1.~’21.12.	‘20.2.13.(재계약 보고)
	‘22.1~’24.12.	민간위탁 → 관리대행
분뇨수집 운반업무 민간위탁	‘17.1.~’19.12.	‘16.11.3.(의회동의)
	‘20.1.~’22.12.	’19.12.18.(재계약 보고)
	‘23.1.~’24.12.	민간위탁 → 용역계약

* 제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례 부칙에 따라 동 조례 시행 당시 종전의 규정에 따른 민간위탁 사무는 그 위탁기간까지는 도의회의 동의를 받은 것으로 본다는 규정에 따름

□ (제주시 지역 위생처리장 민간위탁) '22년부터 ｢하수도법｣ 제19조의2에 따라 관리대행용역으로 변경 시행 중

※ ’21. 9월 민간위탁사무 심의위원회 심의 결과(부결)

(부결 의견) 제주시지역 위생처리장 및 분뇨수집 운반업무 민간위탁 업무에 대해 사무 위탁에 대한 근거 마련 또는 용역사업 추진 등 종합검토

□ 향후계획

□ ｢제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례｣에 따른 의회 동의(보고) 절차 이행

담당부서

상하수도본부 하수도부 하수계획과(☎ 750-7940),

제주하수운영과(☎ 750-7770),현대화사업추진단(☎ 750-7883)

시정 및 처리요구사항

13. 하수처리장 재이용수 시설용량 대비 이용률은 저조하고 유지관리 비용은 계속 들어가고 있어 재이용수 활용방안을 다각적으로 검토할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 재이용시설 운영현황(농업용수)

(2023. 12. 31. 기준)

처리장 명	사업비	시설용량	‘23년 1일 평균이용량(이용률)	비고
서부처리장	55억원	5,000톤/일	316㎥/일(6.32%)	2010년 가동
동부처리장	57억원	5,000톤/일	15㎥/일(0.30%)	2013년 가동

□ 재이용시설 공급현황(농업용수)

(단위 : 톤/년)

구분	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
합계	23,260	12,902	31,603	30,211	21,084	6,210	103,483	128,650	120,966	120,967
서부	18,713	9,588	29,041	24,063	3,200	3,399	91,122	121,135	118,163	115,589
동부	4,547	3,314	2,562	6,148	17,884	2,811	12,361	7,515	2,803	5,378

□ 추진상황 및 문제점

□ 제주시 동·서부하수처리장 주변 농가 무료 제공, 갈수기시 일부 사용, 친환경 농가 하수 재처리수 이미지로 사용 기피

□ 하수처리수 → RO막 공법으로 재처리 → 가압장 → 송수관 → 배수지 → 농가에 공급하고 있으며, 연간 운영비 3억원 이상 소요

* (생산원가) 서부 2,421원/톤, 동부16,876원/톤),  상수도 1,148원/톤

□ 환경부에서 재이용수 이용율 실태점검 결과 제주는 수요성 저조로 경제성이 없다고 결정하여 재이용시설 설치사업 취소(‘16. 1. 16., 대정ㆍ색달처리장)

□ 향후계획

❍ 지하수 보존과 연계하여 재이용수 이미지 개선을 위한 홍보 강화

❍ 지속이용 가능한 수요처 조사 및 경제성 등 검토 후 확대·보급 추진

담당부서

상하수도본부 하수도부 제주하수운영과(☎ 750-7770)

시정 및 처리요구사항
14. 애조로 개설사업 시 삼양동 일부지역 오수관로 매설 요청에 대해 과거 행정에서는 도로개설 사업과 병행하여 매설을 약속하였으나, 이행 요구에 대해 현재는 사실상 불가하다는 번복 행정으로 도민들이 피해를 보고 있는바, 행정의 일관성과 연속성 등을 고려하여 약속 이행 방안을 마련할 것
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 민원개요 ❍ (민 원 인) 제주시 삼양동 고재훈 외 29명 ❍ (위 치) 제주시 삼양동 538-1 ~ 282번지(하수처리 외 지역) ❍ (청원내용) 애조로(회천~신촌) 개설공사와 병행하여 오수관 설치(L=900m) 요구 ※ 상하수도본부 회신 공문(하수도부-18073호(‘17.4.20)) 근거로 하수관 설치 지속 요구 □ 추진상황 ❍ ('17.3.7.) 도의회 청원(오수관 신설) ('17.4.20.) 도로공사 병행 시공 계획 통보 ❍ ('22.5.9.) 오수관 설치 미이행 건의 ('22.5.24) 농경지역 오수관 설치 불가 통보 ※ 2017년 오수관로 시행 통보후 2022년 불가 통보한 사항은 행정의 신의성실 원칙에 위배되지만 ｢하수도법｣ 준수, 공공의 이익 등을 고려하면 불가피한 사항임 ❍ ('22.10.11.) 민원현장 합동 점검(민원인 8, 도의회 2, 본부 2) → 건의지역은 하수처리 외 지역으로 행정에서 공공오수관로 설치 불가. → (토지소유자) 원인자부담으로 하수관 설치, (행정) 저지대지역 오수량에 맞는 맨홀펌프설치 ❍ ('23.5.9.) 오수관 설치 요구에 대한 회신(당초 의견에 따라 설치 불가 재통보) ❍ ('23.7.26.) 오수관로 설치요구 건의 ('23.8.17.) 농경지역 오수관 설치 불가 재통보 □ 문제점 ❍ 하수처리 외 지역(농경지)에 공공하수관 설치시 난개발 및 투기조장 ❍ 건의구간 관로 설치시 애조로 모든 구간 오수관로 설치 민원 폭증 우려 ❍ 하수처리 외 지역 하수 유입으로 하류지역 관로 및 처리장 포화 □ 검토의견 ❍ ｢하수도법｣상 하수처리 외 지역 공공하수도 설치 불가(개인하수처리시설 설치토록 규정) □ 향후계획 □ 협의결과('22.10.11.)에 따라 오수발생 시점 맨홀펌프장 설치 → (토지소유자) 원인자부담으로 하수관 설치, (행정) 저지대지역 오수량에 맞는 맨홀펌프 설치
담당부서	상하수도본부 하수도부 하수시설과 (☎ 750-7970)

시정 및 처리요구사항

15. 하수슬러지 지속 증가로 인한 처리 비용이 계속 증가하고 있어 자원화 할 수 있는 다양한 방안을 강구할 것

처리결과

완결 (     ),  추진중 (○),  추진불가 (    )

□ 슬러지 발생 및 처리 현황

❍ '23년 하수슬러지 발생량 : 150톤/일 (제주시 97, 서귀포시 53)

❍ '24.8월까지 하수슬러지 발생량 : 198톤/일 (제주시 151, 서귀포시 53)

* 현대화사업 추진에 따른 슬러지 처리시설 철거 및 임시 탈수시설 운영으로 제주하수처리장 슬러지 발생량 증가

(단위 : 톤/일)

구분	계	제주	동부	서부	서귀포지역
2023	150	65	8	24	53
2024	198	110	10	25	53
처리방법		자원화(건조+고화) 처리량(41톤/일) 제외 전량 도외 민간 처리(건조)	전량 도외 민간 처리(부숙)

□ 현 슬러지 처리 방법(자원화 및 재활용)

□ 슬러지자원화시설 : 고화토(함수율 40%) → 매립장 중간복토재 활용

□ 도외 처리업체 : 건조(함수율 10%) → 발전소 및 시멘트회사 보조 연료 활용

부숙(함수율 30%) → 토지개량제 활용

□ 향후계획

□ 하수도정비 기본계획 변경을 통한 하수슬러지 건조시설 구축

□ 소각시설 설치시까지 하수슬러지 도외 반출

- 2024 하수슬러지 운반 및 처리용역 → 협상에 의한 계약을 통한 도외반출

·'24. 9월 : 2025년 하수슬러지 운반 및 처리비 원가산정용역 발주

담당부서

상하수도본부 제주하수운영과(☎ 750-7770),

공공하수처리시설 현대화사업추진단(☎ 750-7883)

시정 및 처리요구사항
16. 제주공공하수처리시설 현대화사업에 검토 중인 재이용수 시설 22천톤/일에 대해 경제성 논리 등 논리 개발을 통해 미설치 방안을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ ʼ22. 2. 25. : 시설공사 입찰공고(설계․시공 일괄 입찰) - 재이용수 시설계획을 기본설계에 반영토록 함 ❍ ʼ22. 3. 31.~ 8. 28. : 기본설계 시행(2개 컨소시엄 참여) ❍ ʼ22. 10. 11.~‘23. 1. 9. : 실시설계 시행 ※ 하수처리수 재이용 계획(MBR 처리수 사용으로 별도 재이용시설 불필요) ① 재이용 수량: 6,962㎥/일(시설계획 설계 반영) ② 활용계획 : 장내용수(세정수, 청소수 등), 조경용수, 생활용수(관리동, 야외 화장실 등) ③ 관련 법령에 따라 하수처리량의 10% 재이용시설 설치공간 확보 * 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제10조 및 같은 법 시행령 제12조 ❍ ’23. 4. 28. : 시설공사 착공 □ 향후계획 □ '28. 1. 27. : 시설공사 전체 준공 □ 장래의 하수처리수 재이용율 향상을 위해 추가 시설부지만 확보하고 향후 ｢제주특별자치도 물재이용 관리계획｣에 따른 수요처 확보, 공급방법, 운영 비용, 경제성 등을 고려한 활용계획 마련하여 별도사업 추진
담당부서	상하수도본부 공공하수처리시설 현대화사업추진단(☎ 750-7711)

시정 및 처리요구사항

17. 도두현대화사업 추진 시 피해를 입는 인근 지역 주민들의 관광자원 및 주민소득 창출을 위한 방안이 마련될 수 있도록 노력할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 (  ○  ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

❍ '21. 2. 22.: “제주공공하수처리시설 현대화사업 주민대표협의체”구성

❍ '23. 4. 28.: 제주공공하수처리시설 현대화사업 착공

❍ '23. 4. 13.~’24. 6. 4. : 주변지역 지원사업 계획수립 용역

* 도두일동마을(3개사업), 효동마을(3개사업), 신사수마을(2개사업), 도두어촌계(2개사업)

❍ '24. 7. 1. : 주민지원사업 협약서(안) 마련

❍ '24. 7. 19. : 주민지원사업 협약서(안) 도의회 동의안(원안 가결)

❍ '24. 7. 28. : 주민지원사업 협약 체결

	《협약개요》
‣ 협 약 명 : 제주공공하수처리시설 현대화사업 주민지원사업 협약 ‣ 협약기간 : 협약체결일 ~ 현대화사업 완료 시까지 ‣ 지원규모 : 660억 원(현대화 22만톤 × 30만원/톤 = 660억원) ‣ 협약기관 : 도↔제주공공하수처리시설 현대화사업 주민대표협의체 ‣ 지원대상 : 도두1동마을, 효동마을, 신사수마을, 도두어촌계

□ 향후계획

□ '25. ~ : 주변지역 지원사업 계획에 따른 단계별 사업 시행

담당부서

상하수도본부 공공하수처리시설 현대화사업추진단(☎ 750-7711)

2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현   황

(2024년 8월 31일 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	13	8	5	0
경영관리과	2	1	1	-
경영관리과, 상수도부	1	-	1	-
상수도부	5	3	2	-
하수도부	4	3	1	-
현대화사업추진단	1	1	-	-

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 공기업 경영평가 시 등급이 낮아 이에 대한 원인 분석과 개선방안을 마련할 것.	완결
2	○ 상하수도본부 인력이 정원대비 현원이 많이 부족하여 인력 충원 방안을 마련할 것.	추진중
3	○ 관련 규정에 의거 상수도 시설물(수도관망 및 정수시설 등)별 주기적인 관리 및 청소가 제대로 이루어지지 않아 상수도 수질 오염이 우려되어 정수장 등에 대한 점검 및 정비·관리를 철저히 할 것.	완결
4	○ 환경부 가이드라인에 따라 상수도관망시설에 대한 정기적으로 점검 및 정비를 실시하고 관리대장 및 정비 이력을 작성할 것.	완결
5	○ 정수시설에 대한 전문인력 배치가 법적 지준에 비해 부족하여 시설물 관리가 미흡할 수 있으므로 자격증 취득에 따른 인센티브 부여방안 도입을 검토할 것.	추진중
6	○ 가동률이 100%를 초과하는 정수장 등의 시설물에 대하여 대책 마련이 시급함.	추진중
7	○ 2016년부터 유수율 제고사업을 시행하고 있으나, 유수율 목표 대비 실적이 저조하여 원인 분석과 개선방안을 마련할 것.	추진중
8	○ 연동사거리 인근 도로 수도 등의누수로 도로 파손, 차량 통행 불편 등 원인 조사 및 대책 마련할 것.	완결
9	○ 도시관리계획(재정비) 수립이 완료되면 신규 주거지역, 취략지구 등에 대하여 하수처리구역 내 편입될 수 있도록 방안을 마련할 것.	추진중
10	○ 서귀포시 하수처리장들의 하수슬러지를 위탁 처리하고 있는 업체에서 관련 법규 위반 등으로 지역주민과 마찰을 빚는 등 폐기물 관리가 제대로 이루어지지 않아 입찰참가 제한 등의 제재 방안을 마련할 것.	완결
11	○ 밀페된 하수도 시설물 공사 시 안전수칙을 철저히 지켜 인명사고가 발생치 않도록 철저를 기할 것.	완결
12	○ 하수도법 개정으로 하수관로 등 유지관리계획을 의무적으로 수립하도록 하고 있어 계획을 수립하고 보고할 것.	완결
13	○ 제주공공하수처리시설 현대화사업에 대한 2024년도 국비가 계획보다 줄어들 것으로 우려되어 사업이 차질없이 이루어 질 수 있도록 지방비 또는 국비 추가 확보 방안 등을 마련할 것.	완결

2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과

시정 및 처리요구사항

1. 공기업 경영평가 시 등급이 낮아 이에 대한 원인 분석과 개선방안을 마련할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ '24년 하수도 경영평가 대비 T/F팀 구성·운영계획 수립(’23.10.04.)

- 직전평가 결과 분석 및 개선방안 마련을 위한 T/F팀 회의(2회 개최)

□ 하수도 경영평가(직전평가) 결과분석 및 개선방안 마련·알림(’23.10.06.)

□ '24년 하수도 경영평가 사전 준비계획 수립(’23.10.16.)

□ '24년 경영평가 대비 추진상황 점검, 평가 우수기관 비교·분석 및 추진전략 관련 직원 워크숍 개최(’23. 11.17.)

<공기업 경영평가 실적 관련 원인분석 및 개선방안>

□ 원인분석

- 낮은 상수도 유수율 및 하수관리 분야 경영성과 저조

- 타시도 대비 낮은 하수도 요금현실화로 인한 영업수지 악화 등 경영성과 저조

- 지역특성을 고려하지 않은 획일적 평가지표 적용으로 불리

(타시도 대비 높은 동력비로 인해 평가지표 상 우리도에 불리)

- 조직·인적 자원의 전문성 제고 미비

□ 개선방안

- 유수율 제고 종합대책 재정비 및 하수관리 분야 사업성과 향상 노력

- 영업수지 개선 노력 및 체계적인 원가분석을 통한 변동비 등 원가절감

- 우리도 여건에 맞지 않는 불합리한 평가지표 개정 지속 요청

※ (성과) ’25년 상수도평가부터 우리도에 불리한 동력비 관련 지표 개정 예정

- 업무 담당자의 전문성 제고와 부족 인력 확충 위해 인사부서와 지속적 협의

□ '24년 하수도 경영평가 대비 외부컨설팅 실시('24.1.31.)

❍ 경영평가 등급(순위) 향상 : '21년라(9위)→'22년다(7위)→'23년다(6위)→'24년다(3위)

□ 향후계획

□ 평가 우수기관 벤치마킹을 통한 우수사례 분석 및 우리도 약점 보완

□ 지표개선 노력과 지표체계 변화를 고려하여 평가에 선제적 대응

담당부서

상하수도본부 경영관리과 재무회계팀  (☎ 750-7740)

시정 및 처리요구사항

2. 상하수도본부 인력이 정원대비 현원이 많이 부족하여 인력 충원 방안을 마련할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 (  ○  ),  추진불가 (    )

□ 정‧현원 현황

(ʼ24. 8. 30. 기준)

구분	합계			일반직			연구직			기타직
	정원	현원	증감	정원	현원	증감	정원	현원	증감	청경	공무직
계	268	257	△11	161	155	△6	7	7	-	28/27	72/68
경영관리과	18	18	-	14	17	3	-	-	-	-	4/1
상수도부	114	110	△4	50	48	△2	7	7	-	22/19	35/36
하수도부	117	112	△5	81	76	△5	-	-	-	6/8	30/28
현대화추진단	19	17	△2	16	14	△2	-	-	-	-	3/3

※ 정원규정 변경(2024.1.22.) : (당초) 280명 → (변경) 268명 / (사유) 색달·보목하수처리장 관리대행 실시

□ 추진상황

□ 공무직 인사기준 수립·시행 : '20. 8월

* 장기근무자(10년 이상) 침체 해소를 위한 상·하수도 순환배치 기준 마련

□ 일반직·청원경찰 인사기준 수립 : '21. 12월

* 장기근무자(2년 이상) 순환배치 기준 마련

□ 직원 및 부서장 설문 실시로 ʼ21년 격무부서 지정(20개팀 중 본부 2팀)

* 근평가점 부여, 해외연수 및 포상 시 우대/ 본부 선정현황(ʼ19년 5팀, ʼ20년 3팀)

□ 상하수도본부 차원의 '조직진단 연구용역' 실시 : ʼ21.9.6~12.23

□ ʼ21년도 결산시 외부전문가 컨설팅 실시 : '22.1~4 (30백만원)

□ 인력충원을 위한 조직관리부서 면담 실시: '23. 7. 25.

□ 2023년도 격무부서 선정 : (A등급) 1과, (C등급) 2과

□ ('23.11.) 정수시설운영관리사 자격증 소지자 상하수도본부 우선 전보 배치 요청과 자격증 취득에 따른 인센티브 지원방안 마련 요청

□ ('24.4.) 수질검사팀 조직개편 및 인사교류 고충 건의

□ ('24.6.) 독립적 안전보건관리체계 구축 관련 전담조직 요청 등 인사 고충 건의

□ ('24.8.) 공무직 장기 결원에 따른 기간제근로자(3명, 3천) 채용예산 지원요청

□ 향후계획

□ 인력충원, 근무가점 의무부여 등 지속 건의(조직 및 인사부서 협조)

□ 중처법 대비 전담조직(산업안전보건팀) 신설 지속 요청

담당부서

상하수도본부 경영관리과 총무팀  (☎ 750-7720)

시정 및 처리요구사항

3. 관련 규정에 의거 상수도 시설물(수도관망 및 정수시설 등)별 주기적인 관리 및 청소가 제대로 이루어지지 않아 상수도 수질오염이 우려되어 정수장 등에 대한 점검 및 정비·관리를 철저히 할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 정수장 현황(17개소)

□ 광역(9개소) : 조천·구좌·남원·애월·금악·유수암·서광·회수·토평정수장

□ 지방(8개소) : 도련·오라·한림·어승생·월산·별도봉·강정·추자정수장

□ 정소장 청소주기(* 근거: 「정수장 운영· 관리 업무지침」 환경부 2022. 1.)

항 목	정수지	착수정	혼화지	응집지	침전지
청소주기	1년	5년	2~3년	2~3년	2년
* “강정정수장”은 정수지, 배수지, 착수정, 혼화지, 응집지, 침전지 운영 * 그 외 “16개 정수장”인 경우 정수지, 배수지 운영(월산, 별도봉, 도련의 경우 착수정 운영)

□ 추진상황

□ 청소현황

연도	정수장 청소(회)
	계	강정	회수	남원	도련	유수암	추자	서광	어승생	월산	별도봉	애월	구좌	조천
'21.	19	7	1	-	2	1	1	-	1	1	1	1	2	1
'22.	5	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
'23.	8	3	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

□ ('23. 10. 25.) 정수장 운영·관리(청소) 추진계획 수립

□ ('24. 02. 01.) 조천정수장 외 26개소 청소용역 발주와 시행

□ ('24. 08. 16.) 조천정수장 정수지 외 26개소 청소용역 준공

□ 향후계획

□ 배수지 및 정수장 청소를 위한 관로정비 추진

□「정수장 운영·관리 업무지침」에 따라 각 정수장 주기별 청소 추진

※ 상수도시설의 지속적인 관리·점검 추진

담당부서

상하수도본부 상수도부 상수도생산관리과 (☎ 750-7830)

시정 및 처리요구사항
4. 환경부 가이드라인에 따라 상수도관망시설에 대해 정기적으로 점검 및 정비를 실시하고 관리대장 및 정비 이력을 작성할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진개요 ❍ 광역정수장, 지방정수장별 점검, 수질검사, 일지 작성 - 광역정수장 9개소, 지방정수장 8개소, 상수도관망시설 등 ❍ 노후상수관로 정밀조사와 기술진단 실시 ❍ 노후상수관망 정비사업 추진 등 □ 추진상황 ❍ 17개 정수장 근무인력을 통한 기전시설 점검과 수질확인 ❍ ('20.~'21.) 노후상수관로 정밀조사와 기술진단 실시 - (조사결과) 도․송․배수관 4,833km 중 노후관 1,316km(27%) 교체 ․ 5,630억원 필요 ❍ ('21.~'22.) 환경부 후속 노후 상수도 정비사업 타당성 조사용역 추진 - ('22. 1.) 상수도관망 중점관리지역 11개소 지정(환경부 → 도) - ('22. 2.) 노후상수관로 정밀조사 결과 환경부 제출, 수도정비계획 반영(‘22. 7.) - ('22. 12.) 애월 노후 상수관망 신규정비사업 국비 반영(‘23.~‘25./250억) - ('23. 8.) 구좌·성산 노후상수관망 정비사업 국비 반영('24.~'29./460억) ❍ ('23. 7.) 상수도 중점관리대상지역 채수 용역 실시(’23. 7. 24. ~’24. 3. 13.) ❍ ('24. 5.) 상수도 중점관리대상지역 채수 용역 실시(’24. 5. 22. ~’25. 2. 15.) □ 향후계획 ❍ 정수장별 관로 실시간 모니터링과 유수율 제고사업을 통한 관리대장 작성 ❍ 노후 상수관망 정비와 중점관리지역 수질검사 위탁 등 실시
담당부서	상하수도본부 상수도부 상수도정책시설과 (☎ 750 – 7810) 상하수도본부 상수도부 상수도생산관리과 (☎ 750 – 7830) 상하수도본부 상수도부 누수방지과 (☎ 750 - 7912)

시정 및 처리요구사항

5. 정수시설에 대한 전문인력 배치가 법적 기준에 비해 부족하여 시설물 관리가 미흡할 수 있으므로 자격증 취득에 따른 인센티브 부여방안 도입을 검토할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 전문인력 배치현황

□ 일반수도사업자는 정수시설의 효율적 운영․관리를 위하여 정수시설 규모에 따라 정수시설 운영관리사를 배치하도록 규정*『수도법』제21조(수도시설의 관리) 제7항

정수장 시설물	필요인원(인)				배치인원(인)				과부족(인)
	계	1급	2급	3급	계	1급	2급	3급	계	1급	2급	3급
17개소	48	8	15	25	25	0	7	18	23	8	8	7
※ 배치기준 : 2만㎥이상~5만㎥미만 – 1급(1명), 2급(1명), 3급(2명) 이상 5천㎥이상~2만㎥미만 – 2급(1명), 3급(1명) 이상 5백㎥이상~5천㎥미만 – 3급(1명) 이상

□ 추진상황

□ ('21. 9. 1.) 수도법 일부개정법률안 발의(노웅래의원 대표발의)

- 양성과정 이수형 자격증(3급) 제도 도입

□ ('23. 8.16.) 수도법 일부개정안 발의에 따른「수도법」제24조3항 양성과정 이수형 자격증(3급) 제도 도입 전문개정(환경부)

＊ 수도법 전문개정에 따라 '24. 8. 17. 수도법 개정 시행

□ ('23.11. 7.) 정수시설운영관리사 자격증 소지자 상하수도본부 우선 전보 배치 요청 및 자격증 취득에 따른 인센티브 지원방안 마련 요청

□ 향후계획

□ 수도법 개정으로 양성과정 이수형 자격증(3급) 제도 도입에 따라 정수장 근무자의 자격증 취득을 위한 교육 이수 적극 유도

□ 정수시설 전문인력 충원 및 근평가점 부여 등 인사부서 지속 건의

담당부서

상하수도본부 경영관리과 (☎ 750-7710)

상하수도본부 상수도부 상수도생산관리과 (☎ 750-7830)

시정 및 처리요구사항

6. 가동률이 100%를 초과하는 정수장 등의 시설물에 대하여 대책 마련이 시급함.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 가동률 140% 초과 정수장(3개소, ‘23년말 기준)

지역별	정수장명	시설용량 (㎥/일)	정수장 이용율		정수장 가동율
			일평균생산량 (㎥/일)	이용율 (%)	일최대생산량 (㎥/일)	가동율 (%)
광역1	토평정수장	4,000	6,071	151.8	9,855	246.4
제주시	오라정수장	15,000	24,622	164.1	29,868	199.1
	도련정수장	10,000	22,042	220.4	31,030	310.3

□ 추진상황

□ 제주의 경우 육지부(호수, 강물)와 달리 매우 양호한 수질의 취수원(지하수, 용천수)으로 상수도를 공급하고 있음.

□ 정수장 핵심설비인 펌프의 경우 30~40% 여유율을 보유한 상태로 운영되고 있어, 여름철 등 물 사용이 최대치에 이르는 경우에도 취수․정수․송수 등 운영에 문제가 없는 상태임.

□ 광역정수장은 지하수 인증 정수장으로써 소독만으로 정수를 공급하고 있어 체류시간이 짧고, 펌프의 성능을 고려하여 지하수 취수원뿐만 아니라 인근 광역정수장 간 용수 보충 등 추가 공급하고 있는 실정임.

＊정수장 기술진단(2021. 12.) 결과, 정수지 체류시간 고려할 경우에도 시설용량 대비 추가 생산이 가능하여 다소 초과하여 공급 중

□ 기존 정수장 증설(개량)과 고도처리 도입, 신규 정수장 개발

□ 향후계획

□ 유수율 제고사업을 통한 생산·공급량 절감

□ 기존 정수장 증설(개량)과 고도처리 도입으로 공급량 확대

□ 정수장별 적정 시설용량에 맞도록 수도정비계획(변경) 수립 시 증설과 급수계통 조정 검토

담당부서

상하수도본부 상수도부 상수도생산관리과 (☎ 750-7830)

시정 및 처리요구사항

7. 2016년부터 유수율 제고사업을 시행하고 있으나, 유수율 목표 대비 실적이 저조하여 원인 분석과 개선방안을 마련할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 (  ○  ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

❍ ('16. 3.) 유수율 제고 종합대책 수립('21년 유수율 83% 목표)

❍ ('18. 3.) 유수율 제고사업 세부 실천계획 수립('25년 유수율 85% 목표)

❍ ('22. 8.) 유수율 제고 종합대책 재정비 계획 수립('27년 유수율 85% 목표)

❍ ('23. 8.) 효율적 유수율 향상방안 연구용역 착수

< 효율적 유수율 향상방안 연구용역 >

❍ (용역기간) '23. 8. 23. ~ '24. 8. 16.(일시정지 중 ‘24. 7. 25.) / (용역금액) 250백만원

❍ (용역수행) 대한상하수도학회(80%), 한국수자원공사(20%)

❍ (주요내용)

- 유수율 제고 종합대책 추진과정에서 도출된 문제점에 대한 검토, 분석을 통한 실질적 유수율 달성 추진 정책방향 수립

- 지역‧계절적 특성을 고려한 유수율 추이 분석, 투자사업비 B/C분석, 재원투자계획, 전담인력, 제도개선 등 종합적인 정책방향 마련

❍ ('24.8.) 노후 상수관망 정비사업 국비지원사업 신청 5지역 중 4지역 선정

- 제주시 영평, 사라·별도봉 중블록, 서귀포시 동홍·삼매봉 중블록, 남원·표선 대블록

□ 원인분석

❍ 노후관 과다[배수관로4,252km 중 노후관1,288km,(30.3%)]-노후관 정밀조사 보고서('21.)

❍ 급수인구 대비 관로연장 과다(11.0km/천명, 광역 평균 4.6km/천명)-환경부 통계('22.)

❍ 지역 특성(급수구역의 심한 고저차, 지질 특성에 따른 높은 투수성 등)

❍ 계획 대비 투자 비용 저조['23년까지 계획 대비 27% 투자(2,383억원/8,816억원)]

- 유수율 향상 계획‧추진 기간 12년('16. ~ '27.), 잔여기간 4년('24. ~ '27.)

□ 향후계획

❍ ‘효율적 유수율 향상 방안 연구용역’ 결과를 바탕으로 유수율 종합대책을 재수립하고 가시적 유수율 성과 전략 수립(‘24.10.)

담당부서

상하수도본부 상수도부 누수방지과 (☎ 750 - 7912)

시정 및 처리요구사항

8. 연동사거리 인근 도로 수도 등의 누수로 도로 파손, 차량 통행 불편 등 원인 조사 및 대책 마련할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (     ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

❍ ('23. 5.) 연동사거리(신대로136) 도로 누수 신고 접수 후 현장 확인

* 상수도 시약 반응과 주변 탐사 결과 누수 없음 확인(K-water 현장 확인)

❍ ('23. 10.) 우수관로 CCTV 확인, 합류관과 도로 파손부 제주시 상하수도과, 건설과 합동점검

→ 교통 혼잡 방지를 위한 비굴착 보강공법 추진 결정

< 누수 원인분석 >

❍ K-water 확인 결과(상하수도본부 누수방지과)

- 해당지점에는 상수도관로가 매설되어 있지 않고, 상수도 누수인 경우 누수 발생 시 누수복구가 이루어지기 전까지 지속적으로 누수가 발생해야 하나,

- 우천 이후 일시적으로 노면 누수가 발생하는 점과 상수도 시약 반응이 없는 점 등을 고려하여 상수도 누수가 아닌 것으로 판단

❍ 우수관로 CCTV 확인 결과 우수관 파손 확인(제주시 상하수도과)

❍ ('23. 11. ~ 12.) 실시설계 추진(제주시 상하수도과)

❍ ('23. 12. 26.) 연동 코스모스사거리 우수관로 보수공사 시행

❍ ('24. 01. 26.) 우수관로 보수공사 완료

□ 향후계획

❍ 상수도 공사로 인해 도로파손 등이 발생하지 않도록 시공 철저

담당부서

상하수도본부 상수도부 누수방지과 (☎ 750 - 7912)

시정 및 처리요구사항

9. 도시관리계획(재정비) 수립이 완료되면 신규 주거지역, 취락지구 등에 대하여 하수처리구역 내 편입될 수 있도록 방안을 마련할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진배경

□ 하수처리구역 점진적 확대를 통해 상수원인 지하수 수질 보전

- 개인하수처리시설 신규 설치 지양 및 기존 시설 단계적 폐쇄 추진

※ (법적근거) 「하수도법」 시행규칙 제2조 및 하수도정비기본계획 수립지침(환경부)

□ 하수처리구역 현황

(‘23. 10. 28 기준, 단위 : km2)

구분	계	제주	서부	동부	삼화	보목	색달	대정	남원	성산	소규모
하수처리 구역	210.018	52.134	33.949	18.620	6.668	17.473	20.400	24.669	18.402	12.913	4.790

※ 2040년 목표 하수처리면적 ⇨ 제주도 면적(1,850.23km2)의 11.35%, 전국 8.16%

□ 하수처리구역 추가 설정기준

❍ 도시관리계획(재정비) 신규 주거지역 및 취락지구

❍ 하수관로(오수지선관로 및 지간선병행관로)에 접한 개발예정 토지

❍ 소규모 하수처리구역 중 환경공단 검토과정에서 제외된 토지

【하수처리구역 추가 지정 면적】

(단위 : km2)

구분	계	제주	서부	동부	삼화	보목	색달	대정	남원	성산	소규모
하수처리 구역	20.989 (9.99%)	6.294	1.408	1.340	1.976	2.863	3.742	0.846	0.724	0.663	1.133

□ 추진상황

❍ ('23. 7.13) 2040년 제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획 환경부 승인

❍ ('23.10.27) 지하수 보전을 위한 하수처리 추가 구역도 작성 완료

❍ ('23.11.16.) 하수처리구역 부분변경 하수도정비 기본계획 수립

❍ ('23.11.16.) 하수도정비 기본계획(부분변경) 보고서 제출(환경부)

□ 향후계획

❍ 지하수 수질보전을 위한 하수처리구역 점진적 확대 추진

담당부서

상하수도본부 하수도부 하수계획과(☎ 750-7950)

시정 및 처리요구사항
10. 서귀포시 하수처리장들의 하수슬러지를 위탁 처리하고 있는 업체에서 관련 법규 위반 등으로 지역주민과 마찰을 빚는 등 폐기물 관리가 제대로 이루어지지 않아 입찰참가 제한 등의 제재 방안을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 2024년 서귀포지역 하수처리장 하수슬러지 처리현황 □ (대상시설) 보목·색달·대정·남원·성산 5개 하수처리장 □ (일발생량) 53톤/일 □ (처리방법/업체) 도외처리 / 옥천영농조합(전남 나주) 외 4개사 - 처리공정 : 부숙(함수율30%) → 토지개량제로 활용 □ 추진상황 □ ('23.10.20) 하수슬러지 처리비 적정원가 산정용역(한국자치경제연구원) □ ('24.01.15) 기존 도외 업체(희성이엔텍(전북 김제))와 수의계약(~03.31.) □ ('24.02.05) 계약심의 → 원안 가결 □ ('24.02.26) 입찰공고(~03.08.) □ ('24.03.20) 제안서 평가위원회 개최 및 우선협상자 선정 □ ('24.04.01) 하수슬러지 운반 및 처리용역 착수(~12.31.) * 도내 하수처리장 별 하수슬러지 운반 및 처리용역 계약 현황(전량 도외 반출) - 제주하수처리장(현대화) : ㈜동양환경(전남 무안) 외 4개사 - 제주시 동·서부, 서귀포지역 : 옥천영농조합법인(전남 나주) 외 4개사 □ 향후계획 □ (단기계획) 소각시설 설치시까지 하수슬러지 도외 반출 추진 □ (장기계획) 하수도정비 기본계획 변경을 통한 슬러지 건조시설 구축
담당부서	상하수도본부 하수도부 제주하수운영과(☎ 750-7770), 서귀포하수운영과(☎ 750-7601)

시정 및 처리요구사항

11. 밀폐된 하수도 시설물 공사 시 안전수칙을 철저히 지켜 인명사고가 발생치 않도록 철저를 기할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (  ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ ('22.3.21) 「하수도시설 밀폐공간 안전보건 작업절차 및 안전수칙」 마련

	주 요 내 용
□ (적용대상) 하수처리장/펌프장 맨홀, 집수정 내 준설·정비작업 □ (시설현황) 하수처리장 8개소, 하수펌프장(중계·간이) 632개소 □ (작업절차) 하수도시설 밀폐공간 작업 절차/프로그램 마련 시행 □ (안전수칙) 하수도시설 밀폐공간 작업 안전수칙 마련 시행 - 관리감독자, 작업자 등이 반드시 준수하여야 할 15개 항목 선정 □ (안전점검) 안전조치 여부 등 사전 점검표 작성·작업 허가 - 관리감독자의 밀폐공간 내 작업가능 여부 허가 시 작업실시

□ ('24.02.23) 밀폐공간 작업 안전관리 프로그램 이행 실시계획 수립

□ ('24.03.04) 2024년 안전보건관리계획 수립

□ ('24.06.05) 밀폐공간작업 특별안전보건교육 실시

□ 향후계획

□ 매년 도내 8개 하수처리장별로 「밀폐공간 작업 안전관리 프로그램 이행 실시계획」을 수립하여 사고예방 대응

□「하수도시설 밀폐공간 안전보건 작업절차 및 안전수칙」에 따라 준설작업 시 사전교육 후 작업 진행

□ (사)대한산업안전협회에 안전관리 기술지도 및 보건관리 업무 대행으로 정기적 안전점검 실시 및 지적사항 즉시 조치

담당부서

상하수도본부 하수도부 제주하수운영과(☎ 750-7770),

서귀포하수운영과(☎ 750-7601)

시정 및 처리요구사항

12. 하수도법 개정으로 하수관로 등 유지관리계획을 의무적으로 수립하도록 하고 있어 계획을 수립하고 보고할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 하수도 시설현황

구 분	하수관로 (km)	맨홀 (개소)	우수토실 (개소)	빗물받이 (개소)	펌프장 (개소)	비 고
계	5,417	106,476	194	110,568	641
제 주 시	3,007	63,625	176	75,830	440
서귀포시	2,410	42,851	18	34,738	201

□ 하수관로 유지관리계획 주요내용

□ (점검) 공공하수도관리청이 설치 또는 관리하는 하수관로를 대상으로 점검

□ (청소 및 준설) 점검결과에 따라 청소 및 준설을 연 1회 이상 실시

- 청소 및 준설은 장마 전에 완료하고, 태풍 등으로 침수 우려 시 추가 실시

- 빗물받이 등은 정상 기능 유지를 위해 유입구 청소 및 불법덮개 등이 설치되지 않도록 상시 관리

□ 추진상황

□ ('23. 4.) 하수관로 유지관리기준 고시(환경부)

□ ('23. 5.) 2023년 하수관로 유지관리계획 수립

- 침수우려지역(중점관리지역*)에 대해 관로 현황, 점검 및 계획 수립

* (중점관리지역 지정 현황) 삼화지구(`16년), 김녕·하모지구(`22년), 화북지구(`23년)

□ ('23. 1~9.) 중점관리지역을 포함한 기타 침수우려지역 시설물 유지보수공사 및 준설공사 발주 및 시행

- (하수관로 보수공사) 6,600백만원 투입 하수관로 4,576m 정비

- (준설공사) 2,120백만원 투입, 빗물받이 등 준설 실시(4,002㎥)

- (하수시설물 보수공사) 1,194백만원 투입, 맨홀 및 빗물받이 정비 등 실시

□ ('23. 11.2.) '23년 하수관로 유지관리계획 도의회(현기종 의원) 보고 완료

□ 향후계획

□ 침수우려지역 시설물 유지보수공사 등 시행

담당부서

상하수도본부 하수도부 하수계획과(☎ 750-7940)

시정 및 처리요구사항
13. 제주공공하수처리시설 현대화사업에 대한 2024년도 국비가 계획보다 줄어들 것으로 우려되어 사업이 차질없이 이루어 질 수 있도록 지방비 또는 국비 추가 확보 방안 등을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 사업개요 ❍ (사업기간) 2019년 ∼ 2027년(9년) ❍ (사 업 량) 현대화 22만톤/일(기존 13만톤/일, 증설 9만톤/일) ❍ (총사업비) 4,283억원(국비 2,014, 지방비 2,269) * 국 47%, 지 53% □ 추진상황 ❍ '23. 4. 28. : 시설공사 착공 * 전체 공정율(‘24. 8월말 기준): 13.2% ❍ '23. 9. : '24년도 국비 16,388백만원 반영(기재부) - 도 국비 요구(안) 40,970백만원 ❍ '23. 9. ~ 11. : 2024년도 추가 국비 확보를 위한 국회 방문 절충(3회) ❍ '23. 11. : 2024년도 사업비 57,388백만원 도의회 예산(안) 제출 - 국비 16,388백만원, 지방비(지방채) 41,000백만원 ❍ '23. 12. : 2024년도 국비 8,119백만원 국회 추가 확보 ❍ '24. 3. : 2024년도 환경부 국고보조사업 내역조정 시 국비 2,000백만원 추가 확보 □ 향후계획 ❍ '25년도 안정적 국비 확보를 위한 중앙부처 국고 절충 강화 ❍ 매년 환경부 국고보조사업 내역조정 시 추가 국비 확보 지속 추진
담당부서	상하수도본부 공공하수처리시설 현대화사업추진단 (☎ 750-7711)

Ⅵ. 2024년 행정사무 감사자료

2024 행정사무감사 요구자료 목록

【 공통사항 】

1. 대통령 제주공약사항 추진현황 및 계획

2. 도지사 공약사항 추진상황

3. 국회의원 자료요청 목록

4. 정부산하 각종 위원회로부터 받은 권고, 시정, 제재 등 현황

5. 중앙부처 공모사업 신청 및 선정 현황

6. 다수인 민원 처리현황

7. 청원서 처리 현황(의회 접수 이송된 청원)

8. 진정서 처리현황(의회 접수 이송된 진정)

9. 각종위원회 현황 및 운영실적

10. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

11. 민간위탁금 집행현황

12. 공기관대행사업비 집행현황

13. 각종 기금적립 및 운용실적(최근 3년간)

14. 용역발주현황(20백만원이상)

15. 건설폐기물 처리용역 발주현황(20백만원이상)

16. 지방재정 투자 심사 현황

17. 감사원, 감사위원회 감사 지적사항 및 처리결과

18. 2024년 회계연도 예산의 이용․전용 사항, 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

19. 2024년 예산집행 현황(‘24.8.31기준)

20. 2025년 국비신청 현황

21. 각종 공사 및 물품구입 발주현황(공사 1억, 물품 2천만원 이상)

22. 각종 공사 설계변경 현황(100백만원 이상)

23. 공사중지 사업장 (중지사유 포함) 및 공기연장사업 현황(최근 3년간)

24. 각종 용역 설계변경 현황(20백만원 이상)

25. 수의계약 현황(인쇄물 제외)

26. 각종 공사(관급자재 포함) 특허품 및 특허공업(신기술포함) 사용현황

27. 하도급 등의 대금지급 확인시스템 운용현황

28. 각종 시설물 안전진단 실시현황

29. 도의회의 부대조건(의견)내용 이행상황(최근 3년간)

30. 각종 차입금 현황

31. 각종 소송(행정, 민사) 현황(최근 3년간)

32. 부서별 제주미래비전 실행과제 및 추진사항

33. 부서별 제주국제자유도시 종합계획 실행과제 및 추진사항

34. 지자체 합동평가 항목별 추진상황

35. 각종 T/F팀 운영 현황

36. 사업 완료 후 이관 받은 시설물 현황(도로, 공원)

37. 중앙단위 수상 실적 현황

38. 소관 시설물별 태풍피해 및 복구 현황(최근 3년간)

39. 업무제휴·협약 사후관리 평가회 결과

40. 사업별 국비 반납 내역(최근 3년간)

1. 대통령 제주공약사항 추진현황 및 계획

1		제주공공하수처리시설 현대화사업 등(지역공약)

□ 공약개요

❍ (필요성) 공공하수도 유입 하수량 증가에 대비한 하수처리시설 증설

❍ (사업개요)

- 기간/위치: 2017 ~ 2027년/제주․동부․서부․남원하수처리장

- 사 업 비: 5,514억 원(국비 2,550 지방비 2,964)

- 사업내용: 하수처리장(4개소) 증설 130천톤(258 → 388천톤)

처리장명	사업량	사업비(억원)			사업기간	비고
		계	국비	도비
계	증설 130천 톤	5,514	2,550	2,964
제주하수처리장	증설 90천 톤	4,283	2,014	2,269	'19.∼'28.	계속사업
동부하수처리장	증설 12천 톤	538	213	325	'17.∼'25.	계속사업
서부하수처리장	증설 20천 톤	484	221	263	'21.∼'24.	계속사업
남원하수처리장	증설 8천 톤	209	102	107	'20.∼'23.	계속사업

□ 추진상황

❍ ('15.~'22.) 소요예산 1,219억 원 투입, 처리장 4개소 30.5천 톤/일 증설 완료

※ 색달(6.5천 톤/118억), 보목(10천 톤/674억), 대정(8천 톤/270억) 성산(6천 톤/157억)

❍ ('17.~'24.) 시공중 3개소(제주, 동부, 서부), 설계중 1개소(대정)

❍ ('23.08.28.) 남원처리장 증설공사 준공

□ 향후계획

❍ (제주) 현대화사업 수처리시설(22만㎥/일) 완공(‘25. 12.), 전체 준공(‘28. 1.)

❍ (동부) '25년 동부처리장 증설사업 준공과 주민지원사업 추진

❍ (서부) '24년 서부처리장 증설사업 준공과 주민지원사업 추진

2. 도지사 공약사항 추진상황

1		청정 제주 실현을 위한 안정적 하수처리시설 확보

□ 추진개요 ▷ 하수처리장(8개) 증설 130천톤(258천톤 → 388천톤)

(단위 : 천톤/일, 억원)

처리장	시설용량		총 사업비				사업기간	비 고
	현재	증설 후 (증설량)	계	기투자	’23년	향후
계	258	388 (130)	5,514	1,247	808	3,459	’15.~’29.
제 주	130	220 (90)	4,283	475	675	3,133	’19.~’28.	시공중 (공정률 13%)
동 부	12	24 (12)	538	374	45	119	’17.~’24.	시공중 (공정률 7%)
서 부	24	44 (20)	484	189	88	207	’21.~’24.	시공중 (공정률 74%)
남 원	8	16 (8)	209	209	-	-	’20.~’23.	증설준공 ('23.8.28)
보 목	30	-	-	-	-	-	’18.~’20.	증설준공 ('20.7.31)
색 달	23	-	-	-	-	-	’20.~’22.	증설준공 ('22.2.28)
대 정	21	-	-	-	-	-	’19.~’21.	증설준공 ('21.7.26)
성 산	10	-	-	-	-	-	’15.~’17.	증설준공 ('17.12.20)

□ 추진상황

❍ ('15.~'22.) 소요예산 1,219억 원 투입, 처리장 4개소 30.5천 톤/일 증설 완료

※ 색달(6.5천 톤/118억), 보목(10천 톤/674억), 대정(8천 톤/270억) 성산(6천 톤/157억)

❍ ('17.~'24.) 시공중 3개소(제주, 동부, 서부)

❍ ('23.08.28.) 남원처리장 증설공사 준공

□ 향후계획

❍ (제주) '28. 1. 제주공공하수처리시설 현대화사업 완공과 주민지원사업 추진

❍ (동부) '25년 동부처리장 증설사업 준공과 주민지원사업 추진

❍ (서부) '24년 서부처리장 증설사업 준공과 주민지원사업 추진

2		유수율 제고․인프라 확충을 통한 안정적인 수돗물 공급

□ 공약개요

□ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

□ 사 업 비: 506,218백만원(국비 148,890 도비 357,328)

□ 사업내용: 상수도 유수율 제고사업, 노후정수장 정비(4개소),

정수장시설 확충(3개소), 고도정수처리시설 설치(3개소),

노후상수도관 정비(1,316㎞)

□ 추진상황

□ 상수도 유수율 제고

- '22년 53.3% → '23년 54.2%(0.9% 상승), 관망 블록구축(378개소) 완료

□ 노후정수장(월산·별도봉·강정·한림) 정비사업 추진

- 한림(’22. 12월 완료), 월산·별도봉정수장 개량(~‘24. 12.), 강정정수장 공사 중(공정율: 15%)

□ 고도정수처리시설 설치사업 추진

- 애월(’23.12월 완료), 고도정수처리시설사업 공사 중(공정율: 조천 20%, 토평 35%)

□ 도서지역 상수도공급시설 확충 추진

- 가파․마라담수장 해수담수화시설 개량과 증설사업 설계용역 착수('23. 06.)

- 추자정수장 해수담수화 시설 개량 및 증설사업 착공('24. 07.)

□ 추진계획

□ 상수도 유수율 제고

- 애월읍 노후상수관망 정비사업 우선구간 공사 발주 등 추진('24. 10~)

- 제주시(서부) 현대화사업 관망정비(4차)공사 실시설계, 공사추진('24. 6. ~ '25. 6.)

- 제주시, 서귀포시 동지역 관망정비공사 발주 추진('24. 10.)

- 구좌성산 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 발주('24. 6.)

- 2025년 노후상수관망 정비사업 K-water 대행협약 추진('24. 11.)

□ 상수도 공급시설 확충

- 조천·토평정수장 고도처리와 강정정수장 현대화(659억원 투자, ~‘26년까지)

- 도서지역(추자·가파·마라) 시설 해수담수화(227억원 투자, ’26년까지)

3. 국회의원 자료요청 목록

요청일시	의원명	요청목록	비 고
2023.2.28.	노용호	'20~’23년 각 연도별 국비, 지방비 매칭 신규사업 현황
2023.3.10.	노용호	2020~2023년 연도별 신규사업 현황 2019~2023년 도내 추진하거나 추진 예정인 고수부지 활용 및 하천 주변 개발사업 현황
2023.4.26.	이은주	동부(월정) 공공하수처리시설 증설사업 관련
2023.5.9.	김한규	월정리 동부하수처리장 최신 현황 자료
2023.5.23.	진선미	SOC‧R&D 사업 관련
2023.6.15.	이은주	제주특별자치도 광역하수도정비기본계획(변경) 용역결과
2023.6.29.	이주환	최근 5년간 하수도정비중점관리지역 침수피해 현황
2023.6.29.	김용판	재난관리자원(장비, 자재) 확보계획 및 예산현황
2023.7.8.	임호선	민간투자사업 관련
2023.7.11.	위성곤	성산 오조리 중계펌프장 하수관로 개선사업 관리카드
2023.7.11.	위성곤	현대화사업 추진 관련 자료
2023.7.12.	위성곤	관내 사업 관리카드
2023.7.31.	하태경	CCTV관제센터에서 관리·운용되지 않는 CCTV현황
2023.8.1.	전봉민	최근 5년간 연구용역 발주 현황
2023.8.1.	전봉민	공유재산 사용 및 대부, 매각현황
2023.8.1.	전봉민	국정감사 일반현황
2023.8.3.	엄태영	최근 5년간 시범사업 및 사업이 종료된(3년 내) 사업 현황
2023.8.3.	전봉민	최근 5년간 기관사업으로 직접 창출한 일자리수 통계
2023.8.3.	전봉민	법률자문 현황
2023.8.4.	임이자	하수슬러지 건조시설 조사
2023.8.9.	이주환	군부대 오수발생량 및 방류수수질기준초과 행정처분 자료(2019~2023.7월)
2023.8.28.	강병원	최근 3년간 현금집행 내역
2023.8.29.	서삼석	해수 담수화 관련
2023.9.1.	김용판	국고보조사업비 현황
2023.9.4.	임호선	민간투자사업 현황
2023.9.8.	장혜영	도유지 공유재산 현황
2023.9.26.	문진석	공공하수도 기술진단 관련 계약내용
2023.9.27.	양경숙	국가예산사업 정부반영현황(2023~2024년)
2023.9.27.	신영대	2024년 국가 예산안 SOC 사업 현황
2023.10.11.	문진석	공공하수도 기술진단 관련 게약내용
2023.11.3.	용해인	'24년 비영리민간단체 보조사업 예산 현황
2023.11.6.	양경숙	부서 운용 특별회계 현황 등
2024.1.10.	김한규	제주현안 현황(동부하수처리장 증설 사업 등)
2024.2.2.	김한규	제주동부하수처리장 소송 관련 판결문
2024.6.19.	김종민	방송 광고 집행 현황(최근 6년간)
2024.7.5.	위성곤	행정안전부 특별교부세 사업 현황자료
2024.7.11.	김상위	수돗물 절도현황
2024.7.18.	김주영	하수관로 준설 처리 현황
2024.7.18.	김소희	하수관로 공사 및 맨홀 추락방지시설 현황
2024.7.22.	김위상	공공기관 운영 개인하수처리시설 현황
2024.7.22	김종양	민선7기, 민선8기 연도별 홍보비 집행현황 등
2024.8.2.	문대림	도내 지하수 및 저수지 관련 (24년 유수율 향상방안을 위한 연구용역 보고서)
2024.8.6.	서범수	최근 3년간 예타면제 사업 현황 및 추진 현황
2024.8.7.	엄태영	시범사업 및 사업 종료된 사업 현황
2024.8.8.	한병도	2022~2023년 지방공기업별 지방자치단체로부터의 지원현황 등
2024.8.12.	우재준	맨홀추락방지시설 설치 예산 등
2024.8.13.	임이자	하수슬러지 건조시설 현황
2024.8.21.	한병도	수도요금 고지비용
2024.8.22	배준영	2023년~2024년 7월 말 기준, 조사 의뢰한 연구용역 목록 및 결과보고서 제출 여부 연구용역 현황

4. 정부산하 각종 위원회로부터 받은 권고, 시정, 제재 등 현황

“ 해당사항 없음 ”

5. 중앙부처 공모사업 신청 및 선정 현황

연도	중앙공모		선정현황
	공모기관	공모사업명	선정일자	사업명	사업비
2023	환경부	환경기초시설 탄소중립 프로그램 사업	ʼ23.03.09	환경기초시설 탄소중립 프로그램 사업	146백만원 (국비 73, 도비 73)
2023	환경부	2023년 하수도정비 중점관리지역 지정	ʼ23.10.31	2023년 하수도정비 중점관리지역 지정(화북지구)	22,756백만원 (국비 13,654, 도비 9,102)

6. 다수인 민원 처리현황

“ 해당사항 없음 ”

7. 청원서 처리현황 (의회 접수 이송된 청원)

접수일자	민원인	민원내용	처리결과		처리부서
	주소 및 성명		처리일자	처리내용
2024. 3.15.	부OO외 244명	제주시 아연로(KCTV~제주연구원) 확장과 병행하여 정화조에 의존하는 오수처리 사업 요청	2024. 4.29.	- 정실마을 일원은 현재 추진중인 오라·아라 하수관로 정비사업에 포함되어 2025년부터 사업을 추진할 예정임 - 도시계획도로 중복구간은 지장물 및 도로 다발 횡단 발생, 교통여건 등을 고려하고, 추후 도로확장에 따른 관로이설 및 이중굴착, 예산낭비 발생등으로 도로확장 추진부서인 제주시 도시계획과와 병행 추진 계획	하수도부

8. 진정서 처리현황 (의회 접수 이송된 진정)

접수일자	민원인 주소 및 성명	민 원 내 용	처 리 결 과		처리부서
			처리일자	처리내용
2023.4.15.	고OO (인터넷 민원)	음식물처리기 미생물액상발효(미생물발효)방식의 문제점	2023.5.26	주방용 오물분쇄기 인증을 받은 제품이 「전기용품안전관리법」제3조에 따라 안전인증을 받은 경우에 하수처리구역 내 일반 가정, 개인하수처리시설이 설치된 일반 가정에 한하여 판매․사용 가능하며, 인증받지 않은 불법제품에 대한 정기점검(상․하반기)과 주방용 오물분쇄기 불법제품 사용금지 사항에 대한 대민홍보를 강화하고 있음. - 주방용오물분쇄기 제조․판매 불법행위 신고창구(환경부, 한국 기술인증원(053-601-6455~6))이 운영되고 있음. ※ 음식물류 폐기물 감량기는 「폐기물관리법」 및 「제주특별자치도 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집․운반 및 재활용에 관한 조례」에 따라 소관부서에서 관리되어야 할 사항임.	하수도부
2024.6.5.	오등자연마을협의회 회장 김OO외 60인 (제주시 거북새미길 202-28)	오등동 상수도 설치 요구 건의	2024.6.24.	해당지역은 상수도의 공급여건, 지역 특성 등을 검토한 결과 상수도 시설 확충은 불가한 실정으로, 금년 상반기 발주 예정인 2040수도정비계획 수립 상수도시설의 확충(배수지, 송배수관 등), 광역상수원 공급, 신규 급수구역 지정 등 종합적으로 검토해 나가겠음.	상수도부

9. 각종위원회 현황 및 운영실적

□ 제주특별자치도 수돗물평가위원회

❍ 구성일시 : ʼ23. 5. 18.(최초 : ʼ06. 08. 16.)

❍ 임    기 : ʼ23. 5. 18. ~ ʼ25. 5. 17.(2년)

❍ 기    능

- 수돗물의 정기적인 수질검사 실시 및 공표

- 수도사업자에 대한 수질관리 및 수도시설의 운영에 대한 자문

- 수질검사 대상과 검사 지점의 선정

❍ 근거 :「수도법」제30조 및「제주특별자치도수도급수조례」제57조

❍ 운영실적

(단위 : 회)

구 분	계	운영계획 심의 등	상수도 수질검사실시	수질검사 결과공표심의등	비 고
2023년	5	1	2	2
2024. 8월	3	1	1	1

❍ 위   원 : 총 14명(남 8, 여 6)

연번	직 위	성 명	성별	소 속	비 고
1	위원장	양철신	남	㈜정이엔지 이사
2	부위원장	조기석	남	제주특별자치도 지속가능발전협의회 위원
3	위원	강서영	여	(사)식생활교육제주네트워크 사무국장
4	위원	김순선	여	제주녹색소비자연대 이사
5	위원	김영수	남	일반수요자
6	위원	문경미	여	(사)소비자교육중앙협의회제주도지부 위원
7	위원	변춘미	여	(전)조천읍적십자봉사회장
8	위원	정성철	남	일반수요자
9	위원	안창준	남	새마을지도자 제주특별자치도협의회장
10	위원	이경화	여	제주곶자왈공유화재단 이사
11	위원	이종훈	남	(전)상하수도본부 상수도부장
12	위원	황은영	여	일반수요자
13	위원	강봉래	남	제주연구원(지하수연구센터)
14	위원	진기옥	남	상하수도본부 상수도부장

□ 제주특별자치도 수도사업자문위원회

❍ 구성일시 : ʼ23. 12. 5.(최초 : ʼ15. 10. 5.)

❍ 임    기 : ʼ23. 12. 5. ~ ʼ25. 12. 4.(2년)

❍ 기    능

- 지방직영기업이 추진 중인 중요 수도사업에 관한 자문

ㆍ유수율제고사업, 시설확장사업 등 중요사업 추진 단계별 검토와 검증

- 지방직영 기업의 경영합리화에 관한 사항에 대한 자문

ㆍ지방직영기업 경영개선, 예산의 효율적 집행 등 개선 방안

- 기타 도지사가 필요에 의하여 위원회의 자문이 필요한 사항

❍ 근    거 : ｢제주특별자치도 수도사업 지방직영기업설치조례｣ 제10조

❍ 운영실적

일 시	회 의 내 용	비고
ʼ23. 10. 13.	2023년 수도사업 추진현황 보고, 수도사업 관련 자문 등

❍ 위    원 : 총  8명(남 5, 여 3)

연번	구분(분야)		기관(단체)명	직 위	성 명	성별	비고
1	당연직 위원		제주특별자치도 상하수도본부	본부장	좌재봉	남	도내
2	위촉직위원	물산업	한국수자원공사 전남서남권	지사장	김재학	남	도외
3		수질	한국수자원공사 상하수도연구소	소장	채선하	여	도외
4		경영	한국수도경영연구소	부소장	한상근	남	도외
5		경영	서울아리수본부	급수부장	백광인	남	도외
6		회계	성현회계법인	이사	조희철	남	도외
7		환경	제주환경운동연합	공동대표	정봉숙	여	도내
8		수질	도 보건환경연구원	토양화학과장	오순미	여	도내

□ 제주특별자치도 상수원보호구역 주민지원사업 추진위원회

❍ 구성일시 : ʼ24. 9. 1.(최초 : ʼ20. 9. 1.)

❍ 임    기 : ʼ24. 9. 1 ~ ʼ26. 8. 31.(2년)

❍ 기    능

- 주민지원사업계획 심의·결정

- 주민지원사업 신청자에 대한 지원여부 심의·결정

- 주민지원사업비 결산 심의 및 집행내역 주민 공개

- 상수원의 수질 및 수생태계 보전을 위하여 도지사가 인정한 사항

❍ 근    거 : 「제주특별자치도 상수원보호구역 주민지원에 관한 조례」제6조

❍ 운영실적

일 시	회 의 내 용	비고
ʼ23. 12. 13	2023년도 사업결산 및 2024년도 사업계획 심의(서면)

❍ 위원 현황 : 총 12명(남 11, 여 1)

연번	성 명	성별	소 속	비 고
1	진명기	남	행정부지사	당연직/위원장
2	좌재봉	남	상하수도본부장	당연직/부위원장
3	김동옥	남	한림읍장	당연직
4	현치하	남	건입동장	당연직
5	고상익	남	삼양동장	당연직
6	양경수	남	외도동장	당연직
7	윤세명	남	대천동장	당연직
8	고성봉	남	한림읍 동명리장	위촉직
9	고원평	남	건입동 주민자치위원장	위촉직
10	강영순	여	삼양동 새마을부녀회장	위촉직
11	김성훈	남	외도동 주민자치위원장	위촉직
12	조상우	남	강정마을회장	위촉직

10. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

□ 총  괄

(단위 : 천원)

구 분		건 수	보조금액	정산액	비 고
총 계		234	19,397,546	6,285,490
상수도부	소 계	11	254,000	224,000	상수원보호구역 내 환경정화사업과 친환경 유기질비료지원사업
	2023	5	124,000	124,000
	2024	6	130,000	100,000
하수도부	소 계	183	15,368,800	2,645,407	해역생태보전사업 등
	2023	95	11,527,500	2,407,407
	2024	88	3,841,300	238,000
현대화 추진단	소 계	40	3,774,746	3,416,083	주민감시 활동 지원사업 등
	2023	20	2,167,696	2,107,540
	2024	20	1,607,050	1,308,543

□ 2023년

(단위 : 천원)

구 분	사업명	보조대상	보조금액	정산액	사업내용
상수도부	상수원보호구역 친환경유기질비료 지원사업	중문농업 협동조합 (위탁공급)	100,000	100,000	·상수원보호구역내 농경지 친환경유기질비료 지원
	상수원보호구역 주민지원사업	삼양2동 청년회	6,000	6,000	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·세계물의날 행사 추진 등
		새마을지도자 외도동협의회	6,000	6,000	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·상수원 보호 캠페인 등
		더조은일강정	6,000	6,000	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·맑은 물 공급홍보 캠페인등
		건입동통장 협의회	6,000	6,000	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·물사랑 창작대회 개최 등
하수도부	하수처리시설 주변지역 지원사업 (제주하수처리장)	삼양어촌계	60,000	60,000	·해역생태계 보전사업
		삼양어촌계	8,000	8,000	·주민복지증진사업
		삼양2동마을회	12,000	12,000	·해안정화 및 마을환경 정비사업
		화북1동 동마을복지회	12,000	12,000	·주민복지증진사업
하수도부	하수처리시설 주변지역 지원사업 (제주하수처리장)	화북1동 금산마을회	12,000	12,000	·해안정화 및 마을환경 정비사업
		화북어촌계	20,000	20,000	·해역생태 보전사업
		용담어촌계	20,000	20,000	·수산물 종패사업
		용담어촌계	8,000	8,000	·선진지견학 지원사업
		용담어촌계	5,000	5,000	·잠수활동지원사업
		용담어촌계	11,000	11,000	·해안정화사업
		이호어촌계	28,000	28,000	·해역생태보전사업
		동한두기마을회	13,000	13,000	·해안정화 및 마을환경 정비사업
	위생처리장 주변지역 지원사업	신성마을회	20,000	20,000	·주민복지증진사업
		금악리새마을회	12,000	12,000	·주민복지증진사업
	소규모 하수처리시설 주변지역 지원사업	비양동새마을회	1,120,000	추진중	·지역 특산물 저장·판매 시설 및 부대시설 확충
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (동부하수처리장)	김녕리마을회	1,200,000	추진중	·마을문화복지공간 조성사업
		김녕어촌계	1,370,000	추진중	·김녕해양문화복지센터 건립
		월정어촌계	12,000	12,000	·수산물 종패사업
		월정리마을회	20,000	10,883	·선진환경시설 견학 지원사업
		월정리마을회	12,000	12,000	·주민복지 증진사업
		김녕리마을회	30,000	22,878	·주민감시활동 지원사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (서부하수처리장)	월령리새마을회	1,000,000	추진중	·다가구주택 신축공사
		판포어촌계	850,000	추진중	·작업장 및 공동 농수산물 판매장 신축
		판포리어촌계	42,000	42,000	·해역생태 보전사업
		판포리마을회	24,000	24,000	·마을가꾸기사업
		판포리마을회	20,000	20,000	·선진지견학 지원사업
		판포리마을회	30,000	30,000	·주민감시활동 지원사업
		애월어촌계	20,000	20,000	·수산물 종패사업
		월령어촌계	20,000	20,000	·해안정화사업
		동귀어촌계	20,000	20,000	·해역생태보전사업
		구엄어촌계	12,000	12,000	·수산물 종패사업
		월령리마을회	30,000	30,000	·주민복지증진사업
		판포리마을회	56,500	56,500	·주민복지증진사업
하수도부	하수처리시설 주변지역 지원사업 (보목하수처리장)	보목마을회	3,300,000	추진중	·보목지역살리기 임대주택사업
		보목마을회	70,000	69,664	·감시활동지원사업
		보목동어촌계	18,000	17,941	·주민역량강화사업(감시단 운영)
		보목동어촌계	20,000	20,000	·선진환경시설견학 지원사업
		보목동어촌계	72,000	72,000	·수산물 종패사업
		보목동어촌계	12,000	12,000	·해역생태계 보전사업
		토평동어촌계	63,000	63,000	·수산물 종패사업
		토평동어촌계	12,000	12,000	·해역생태계 보전사업
		서귀동어촌계	30,000	30,000	·해역생태계 보전사업
		보목마을회	20,000	20,000	·주민복지 향상사업
		보목마을회	20,000	20,000	·주변환경정비 지원사업
		보목동어촌계	20,000	20,000	·복지증진사업
		송산서귀마을회	360,000	246,549	·근린공원시설 정비사업
	호근위생처리장 주변지역 지원사업	호근동마을회	12,000	12,000	·마을회관 정비사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (색달하수처리장)	예래동마을회	16,000	16,000	·감시활동 지원사업
		색달동어촌계	70,000	70,000	·수산물 종패사업
		하예동어촌계	25,000	24,992	·해역생태계 지원사업
		하예동어촌계	40,000	40,000	·수산물 종패사업
		중문동어촌계	22,000	22,000	·수산물 종패사업
		중문동어촌계	12,000	12,000	·공동이용시설 집기류 구입
		대포동어촌계	80,000	80,000	·수산물 종패사업
		법환동어촌계	40,000	40,000	·어장정화 및 수산물 종패사업
		대평리어촌계	25,000	25,000	·어장정화 및 수산물 종패사업
		월평마을회	12,000	12,000	·복지증진사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (대정하수처리장)	하모1리 마을회	150,000	추진중	·하모리 마을살리기 주택임대사업
		무릉어촌계	4,000	4,000	·복지증진사업
		상모어촌계	10,000	10,000	·복지증진사업
		하모어촌계	13,000	13,000	·복지증진사업
		상모1리마을회	20,000	20,000	·선진환경시설견학 지원사업
		하모1리마을회	15,000	15,000	·선진환경시설견학 지원사업
		상모어촌계	80,000	80,000	·수산물 종패사업
		하모어촌계	67,000	67,000	·수산물 종패사업
하수도부	하수처리시설 주변지역 지원사업 (대정하수처리장)	동일리마을회	12,000	12,000	·해역생태계 보전사업
		가파리어촌계	10,000	10,000	·해역생태계 보전사업
		동일어촌계	30,000	30,000	·해역생태계보전사업
		무릉어촌계	6,000	6,000	·해역생태계 보전사업
		상모어촌계	55,000	55,000	·해역생태계보전사업
		하모어촌계	91,000	91,000	·해역생태계 보전사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (남원하수처리장)	세화2리어촌계	20,000	20,000	·수산물 종패사업
		위미2리어촌계	20,000	20,000	·수산물 종패사업
		태흥2리마을회	45,000	45,000	·주민복지향상사업
		토산2리마을회	20,000	20,000	·주민복지향상사업
		위미2리어촌계	20,000	20,000	·주변해역생태계 보전사업
		태흥2리어촌계	30,000	30,000	·주변해역생태계 보전사업
		태흥3리어촌계	20,000	20,000	·수산물 종패사업
		세화2리마을회	20,000	20,000	·환경정비사업
		태흥1리마을회	10,000	10,000	·환경정비지원사업
		표선리마을회	7,000	7,000	·환경정비사업
		태흥2,3리마을회	20,000	20,000	·감시활동 지원사업
		표선리마을회	14,000	14,000	·공동이용시설 정비사업
		토산2리마을회	5,000	5,000	·환경정비사업
		하천리마을회	15,000	15,000	·공동이용시설 정비사업
		태흥1리어촌계	20,000	20,000	·공동이용시설 정비사업
		태흥3리마을회	15,000	15,000	·공동이용시설 정비사업
		태흥3리마을회	15,000	15,000	·환경정비사업
		태흥2리마을회	30,000	30,000	·공동이용시설 정비사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (성산하수처리장)	오조리어촌계	28,000	28,000	·오조어촌종합센터도색사업
		성산리마을회	25,000	25,000	·지역주민건강증진사업
		고성리마을회	12,000	12,000	·환경정비사업
		성산리어촌계	15,000	15,000	·환경정비사업
		신산리마을회	12,000	12,000	·환경정비사업
		오조리마을회	26,000	26,000	·환경정비사업
현대화	하수처리시설 주변지역 지원사업 (제주하수처리장)	도두1동마을회	504,446	504,446	·주민감시 활동 지원사업
추진단		신사수마을회	184,000	184,000	·주민감시 활동 지원사업
		효동마을회	184,000	184,000	·주민감시 활동 지원사업
		도두1동마을회	66,000	66,000	·마을환경정비사업
		신사수마을회	15,000	15,000	·마을환경정비사업
		효동마을회	33,250	33,250	·마을환경정비사업
		도두어촌계	300,000	300,000	·해역생태계보전사업
		도두1동마을회	60,000	60,000	·선진환경시설 견학 지원사업
		신사수마을회	30,000	30,000	·선진환경시설 견학 지원사업
		효동마을회	35,000	35,000	·선진환경시설 견학 지원사업
		도두어촌계	45,000	45,000	·선진환경시설 견학 지원사업
		도두어촌계	50,000	50,000	·해삼종패지원사업
		도두어촌계	30,000	30,000	·어선어업지원사업
		도두어촌계	15,000	15,000	·어선어업지원사업
		도두1동마을회	80,000	79,952	·잠수활동지원사업
		신사수마을회	16,000	15,899	·주민복지증진사업
		효동마을회	40,000	39,999	·주민복지증진사업
		도두어촌계	70,000	70,000	·주민복지증진사업
		신사수마을회	340,000	281,919	·주변지역 태양광시설 등 지원
		신사수마을회	70,000	68,075	·공동이용시설 보수지원사업

□ 2024년

(단위 : 천원)

구 분	사업명	보조대상	보조금액	정산액	사업내용
상수도부	상수원보호구역 친환경유기질비료 지원사업	중문농업 협동조합 (위탁공급)	100,000	100,000	·상수원보호구역내 농경지 친환경유기질비료 지원
	상수원보호구역 주민지원사업	삼양2동 청년회	6,000	추진중	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·세계물의날 행사 추진 등
		새마을지도자 외도동협의회	6,000	추진중	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·상수원 보호 캠페인 등
		한림읍연합 청년회	6,000	추진중	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·물절약 홍보 캠페인등
		강정청년회	6,000	추진중	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·맑은 물 공급홍보 캠페인등
		건입동통장 협의회	6,000	추진중	·상수원보호구역 내 환경정화활동 ·물사랑 창작대회 개최 등
하수도부	하수처리시설 주변지역 지원사업 (제주하수처리장)	삼양어촌계	42,000	42,000	·해역생태계 보전사업
		삼양어촌계	8,000	8,000	·주민복지증진사업
		삼양2동마을회	8,400	추진중	·해안정화 및 마을환경 정비사업
		삼양2동마을회	7,000	추진중	·선진지 견학 지원사업
		화북1동 동마을복지회	9,600	추진중	·주민복지증진사업
		화북1동 금산마을회	9,000	9,000	·해안정화 및 마을환경 정비사업
		화북1동 금산마을회	12,600	추진중	·선진지 견학 지원사업
		화북어촌계	11,200	11,200	·해역생태 보전사업
		용담어촌계	14,000	14,000	·수산물 종패사업
		용담어촌계	5,000	추진중	·잠수활동지원사업
		용담어촌계	8,800	8,800	·해안정화사업
		이호어촌계	19,600	19,600	·해역생태보전사업
		이호어촌계	8,000	추진중	·선진지 견학 지원사업
		동한두기마을회	10,000	추진중	·해안정화 및 마을환경 정비사업
	위생처리장 주변지역 지원사업	신성마을회	18,000	18,000	·주민복지증진사업
		제성마을회	18,000	추진중	·공동이용시설정비사업
		제성마을회	9,000	추진중	·마을환경개선사업
하수도부	위생처리장 주변지역 지원사업	제성마을회	9,000	추진중	·선진지견학 지원사업
		금악리새마을회	10,000	10,000	·주민복지증진사업
	소규모 하수처리시설 주변지역 지원사업	비양동조일리 새마을회	185,000	추진중	·지역 특산물 저장·판매 시설 및 부대시설 확충
		비양동새마을회	8,400	8,400	·수산물 종패사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (동부하수처리장)	김녕리마을회	500,000	추진중	·마을문화복지공간 조성사업
		월정어촌계	12,000	추진중	·선진환경시설 견학 지원사업
		월정어촌계	10,000	추진중	·해양환경 개선 지원사업
		월정리마을회	20,000	추진중	·주민감시활동 지원사업
		김녕리마을회	20,000	추진중	·주민감시활동 지원사업
		김녕어촌계	10,000	추진중	·수산물 종패사업
		김녕어촌계	12,000	추진중	·선진환경시설 견학 지원사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (서부하수처리장)	월령리새마을회	413,700	추진중	·다가구주택 신축공사
		월령리새마을회	500,000	추진중	·경로당주방 및 다목적실 신축
		판포어촌계	38,000	추진중	· 해역생태 보전사업
		판포리마을회	20,000	추진중	·마을가꾸기 사업
		판포리마을회	20,000	추진중	·주민감시활동 사업
		월령어촌계	18,000	추진중	·해안정화사업
		애월어촌계	20,000	20,000	·수산물종패사업
		동귀어촌계	18,000	추진중	·해역생태 보전사업
		월령리마을회	25,000	추진중	·주민 복지증진사업
		판포리마을회	50,000	추진중	·주민복지증진사업
		금성어촌계	10,000	추진중	·해안정화사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (보목하수처리장)	보목마을회	500,000	추진중	·보목지역살리기 임대주택사업
		보목마을회	25,000	추진중	·감시활동지원사업
		보목마을회	8,000	추진중	·선진환경시설견학 지원사업
		보목마을회	15,000	추진중	·공동이용시설 정비사업
		보목마을회	15,000	추진중	·공동이용시설 집기류 구입
하수도부	호근위생처리장 주변지역 지원사업	호근동마을회	12,000	추진중	·공동이용시설 정비사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (색달하수처리장)	예래동하수처리장 대책위원회	12,000	추진중	·감시활동지원사업
		예래동마을회	12,000	12,000	·공동이용시설 집기류 구입
		색달동어촌계	30,000	추진중	·수산물 종패사업
		하예동어촌꼐	30,000	추진중	·어장정화 및 수산물 종패사업
		중문동어촌계	17,000	추진중	·수산물종채사업
		중문어촌계	10,000	추진중	·안전입간판설치
		대포동어촌계	30,000	추진중	·수산물 종패사업
		법환동어촌계	30,000	추진중	·어장정화 및 수산물 종패사업
		월평마을회	12,000	추진중	·공동이용시설 정비사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (대정하수처리장)	무릉어촌계	4,000	추진중	·복지증진사업
		하모어촌계	15,000	추진중	·복지증진사업
		상모1리마을회	12,000	추진중	·복지증진사업
		하모1리마을회	12,000	추진중	·복지증진사업
		하모어촌계	8,000	추진중	·선진환경시설견학 지원사업
		상모어촌계	8,000	추진중	·선진환경시설견학 지원사업
		동일리마을회	5,000	추진중	·선진환경시설견학 지원사업
		상모어촌계	30,000	추진중	·수산물 종패사업
		가파리어촌계	10,000	추진중	·해역생태계 보전사업
		동일어촌계	25,000	추진중	·해역생태계보전사업
		무릉어촌계	6,000	추진중	·해역생태계 보전사업
		상모어촌계	45,000	추진중	·해역생태계보전사업
		하모어촌계	64,000	추진중	·해역생태계 보전사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (남원하수처리장)	태흥3리마을회	330,000	추진중	·다목적회관 신축사업
		태흥3리어촌계	70,000	추진중	·어촌계 공동이용시설 신축사업
		태흥2리마을회	22,000	추진중	·주민소득증대 지원사업
		세화어촌계	15,000	추진중	·수산물 종패사업
하수도부	하수처리시설 주변지역 지원사업 (남원하수처리장)	태흥3리어촌계	20,000	추진중	·수산물 종패사업
		위미2리어촌계	15,000	추진중	·수산물 종패사업
		태흥2리어촌계	25,000	추진중	·주변해역 생태계보전사업
		태흥2,3리마을회	20,000	추진중	·감시활동 지원사업
		토산2리마을회	13,000	추진중	·환경정비사업
		태흥1리마을회	10,000	10,000	·환경정비사업
		위미2리어촌계	15,000	추진중	·주변해역 생태계보전사업
		표선리마을회	5,000	추진중	·환경정비사업
		하천리마을회	15,000	추진중	·주민복지향상사업
		태흥3리어촌계	8,000	추진중	·선진환경시설 견학 지원사업
		태흥3리마을회	10,000	추진중	·환경정비사업
	하수처리시설 주변지역 지원사업 (성산하수처리장)	고성리마을회	12,000	추진중	·환경정비사업
		성산리마을회	20,000	추진중	·지역주민건강증진사업
		성산리어촌계	15,000	15,000	·환경정비사업
		성산리어촌계	20,000	20,000	·해삼종패사업
		신산리마을회	12,000	12,000	·환경정비사업
		오조리마을회	20,000	추진중	·환경정비사업
현대화 추진단	하수처리시설 주변지역 지원사업	도두1동마을회	403,000	403,000	·주민감시 활동 지원사업
		신사수마을회	147,000	147,000	·주민감시 활동 지원사업
		효동마을회	147,000	147,000	·주민감시 활동 지원사업
		도두1동마을회	60,000	60,000	·마을환경정비사업
		신사수마을회	12,000	12,000	·마을환경정비사업
		효동마을회	30,000	30,000	·마을환경정비사업
		도두어촌계	300,000	300,000	·해역생태계보전사업
		도두1동마을회	35,000	추진중	·선진환경시설 견학 지원사업
		신사수마을회	15,000	15,000	·선진환경시설 견학 지원사업
		효동마을회	22,250	추진중	·선진환경시설 견학 지원사업
현대화 추진단	하수처리시설 주변지역 지원사업	도두어촌계	25,000	25,000	·선진환경시설 견학 지원사업
		도두어촌계	45,000	45,000	·해삼종폐지원사업
		도두어촌계	30,000	29,997	·어선어업지원사업
		도두어촌계	25,000	25,000	·잠수활동지원사업
		도두1동마을회	64,000	추진중	·주민복지증진사업
		신사수마을회	12,800	추진중	·주민복지증진사업
		효동마을회	32,000	11,276	·주민복지증진사업
		도두어촌계	56,000	50,447	·주민복지증진사업
		도두1동마을회	126,000	7,823	·주변지역 태양광시설 등 지원
		신사수마을회	20,000	추진중	·공동이용시설 보수지원사업

11. 민간위탁금 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	년도별	사업명	위탁기관	사업비	사업기간	위탁내용	의 회 동의일
하수도부	합 계			31,373,481
	'23년	소 계		9,148,481
		06서귀포읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	청정서귀포㈜	1,785,562	2011.04.29. ~2031.04.28	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		06제주시동지역 하수관로정비 BTL사업운영비	푸른제주 지키미㈜	850,000	2011.07.03. ~2031.07.02.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		06제주시읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	제주엔바이로㈜	1,022,000	2011.03.03. ~2031.03.02	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		08제주시동지역 하수관로정비 BTL사업운영비	푸른제주환경㈜	730,000	2013.02.01. ~2033.01.31.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		08제주시읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	제주맑은물 사랑㈜	1,250,000	2013.08.01. ~2033.07.31.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		09제주시읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	제주에코텍㈜	710,000	2013.12.25. ~2033.12.24.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		10제주시읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	제주맑은물㈜	702,000	2015.08.27. ~2035.08.26.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		제주시(제주,동부,서부) 위생처리장 관리대행	㈜경원산업	2,098,919	2023.01.01. ~2023.12.31.	제주시 위생처리장(제주,동부,서부) 운영 및 유지관리 전반
	'24년	소 계		14,459,000
		06서귀포읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	청정서귀포㈜	1,900,000	2011.04.29. ~2031.04.28.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		06제주시동지역 하수관로정비 BTL사업운영비	푸른제주 지키미㈜	920,000	2011.07.03. ~2031.07.02.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
하수도부	'24년	06제주시읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	제주엔바이로㈜	1,058,000	2011.03.03. ~2031.03.02.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		08제주시동지역 하수관로정비 BTL사업운영비	푸른제주환경㈜	770,000	2013.02.01. ~2033.01.31.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		08제주시읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	제주맑은물 사랑㈜	1,292,000	2013.08.01. ~2033.07.31.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		09제주시읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	제주에코텍㈜	739,000	2013.12.25. ~2033.12.24.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		10제주시읍면지역하수관로정비 BTL사업운영비	제주맑은물㈜	730,000	2015.08.27. ~2035.08.26.	하수관로 정비BTL사업 시설운영비
		제주시(제주,동부,서부) 위생처리장 관리대행	㈜경원산업	2,300,000	2024.01.01. ~2024.12.31.	제주시 위생처리장 (제주,동부,서부) 운영 및 유지관리 전반
		서귀포지역 공공하수처리시설 관리대행 시범사업	㈜이산	4,750,000	2024.01.01. ~2026.12.31.	보목, 색달하수처리장 민간관리대행 시범사업
현대화추진단	합 계			7,766,000
	ʼ23	광역하수 슬러지 자원화시설 민간위탁	효성중공업㈜	3,691,400	ʼ22.05. ~ ʼ24.12.	광역하수슬러지 자원화시설 운영·관리	'22. 02.17.
	ʼ24	광역하수 슬러지 자원화시설 민간위탁	효성중공업㈜	4,074,600

12. 공기관대행사업비 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	년도	사업명	대행기관	당해연도 사업비 (천원)	사업기간	사업내용	비 고
		총 계		196,228,118
상수 도부	'23년	동지역 유수율 제고사업	한국 수자원공사	15,000,000	ʼ23. 01월 ~ ʼ23. 12월	- 블록구축공사 시행(계속) - 블록구축 완료, 블록 단계시험 - 관로 개선 구간 선정과 상수도 시설물 계획 - 누수탐사와 복구(계속)
		제주시 동지역(서부) 노후상수관망 정비사업	한국 수자원공사	15,750,000	ʼ23. 01월 ~ ʼ23. 12월	- 관망정비(노후관 교체) 1, 2, 3차 실시설계와 공사발주 - 블록구축 본공사 시행(계속) - 블록구축 완료, 블록 단계시험 - 수압관리를 위한 감압변 설치
		한림한경 대정안덕 유수율 유지관리사업	한국 수자원공사	3,000,000	ʼ23. 01월 ~ ʼ23. 12월	- 누수탐사와 누수복구 - 블록 수압관리와 유량관리
		상수도분야 기후위기 적응대책 수립	제주대학교 (산학협력단)	80,000	ʼ23. 01월 ~ ʼ23. 12월	- 기후변화 현황 - 상수도분야 적응능력 분석 - 기후변화 영향과 취약성 평가 - 대응사업 우선순위와 중점 추진분야 선정
	'24년	동지역 유수율 제고사업	한국 수자원공사	21,500,000	ʼ24. 01월 ~ ʼ24. 12월	- 블록구축 완료, 블록 단계시험 - 관로 개선 구간 선정과 상수도 시설물 계획 - 수압관리를 위한 감압변 설치 - 누수탐사와 복구(계속)
		제주시 동지역(서부) 노후상수관망 정비사업	한국 수자원공사	15,626,000	ʼ24. 01월 ~ ʼ24. 12월	- 관망정비(노후관 교체) 1, 2, 3, 4차 공사발주 - 블록구축 본공사 준공 - 블록구축 완료, 블록 단계시험 - 수압관리를 위한 감압변 설치
		구좌성산 노후상수관망 정비	한국 수자원공사	6,910,000	ʼ24. 01월 ~ ʼ24. 12월	- 관망정비(노후관교체) 우선구간과 본공사 실시설계 - 블록구축 완료, 블록 단계시험 - 누수탐사와 복구(계속)
상수 도부	'24년	블록구축지역 유수율 유지관리 대행사업(조천)	한국 수자원공사	4,500,000	ʼ24. 01월 ~ ʼ25. 12월	- 유수율제고(70%) - 누수탐사와 복구 - 단계시험 등 현장관리
		블록구축지역 유수율 유지관리 대행사업 (대정안덕, 한림한경)	한국 수자원공사	2,000,000	ʼ23. 01월 ~ ʼ25. 12월	- 유수율 제고(65%) - 누수탐사와 복구 - 단계시험 등 현장관리
하수 도부	'23년	동부서부 하수처리장 증설사업 어업피해조사용역	한국 농어촌공사	5,627,535	ʼ19.2.14. ~ 보상 완료시	- 서부 증설(24천톤→44천톤), 동부 증설(12천톤→24천톤), 우도 신설(450톤) 및 육상양식장 어업피해에 대한 보상 ‧ 어업보상금 ‧ 위탁수수료 ‧ 어업피해조사용역비 ‧ 감정평가 수수료 등
		서귀포 5개처리장 증설사업 어업피해보상 대행	한국 농어촌공사	4,364,583	ʼ19.5.13. ~ 보상 완료시	- 서귀포 5개 공공하수처리장 증설 사업 추진에 따른 인근해역 어업인 피해 최소화를 위하여 어업관련 합리적 피해보상 ‧ 사업규모: 5개처리장(용량 74 천톤→ 105천톤) 증설에 따른 어업피해 보상
	'24년	동부서부 하수처리장 증설사업 어업피해조사용역	한국 농어촌공사	2,000,000	ʼ19.2.14. ~ 보상 완료시	- 서부 증설(24천톤→44천톤), 동부 증설(12천톤→24천톤), 우도 신설(450톤) 및 육상양식장 어업피해에 대한 보상 ‧ 어업보상금 ‧ 위탁수수료 ‧ 어업피해조사용역비 ‧ 감정평가 수수료 등
하수 도부		서귀포 5개처리장 증설사업 어업피해보상 대행	한국 농어촌공사	2,380,000	ʼ19.5.13. ~ 보상 완료시	- 서귀포 5개 공공하수처리장 증설 사업 추진에 따른 인근해역 어업인 피해 최소화를 위하여 어업관련 합리적 피해보상 ‧ 사업규모: 5개처리장(용량 74 천톤 → 105천톤) 증설에 따른 어업피해 보상
현대화 추진단	'23년	제주공공하수 처리시설 현대화사업	한국 환경공단	29,983,000	ʼ19. ~ ʼ27.	- 현대화 22만톤/일 (기존 13만톤/일, 증설 9만톤/일)
	'24년	제주공공하수 처리시설 현대화사업	한국 환경공단	65,507,000	ʼ19. ~ ʼ27.	- 현대화 22만톤/일 (기존 13만톤/일, 증설 9만톤/일)
		제주공공하수 처리시설 현대화사업 어업손실보상 업무 대행	한국 부동산원	2,000,000	ʼ24. ~ ʼ25.	- 제주공공하수처리시설 현대화사업 시 해양방류관로 설치에 따른 주변지역 어업피해에 대하여 어업손실보상 시행 ‧사업규모: 해양방류관로(L=1.5km) 신설공사에 따른 어업피해보상

13. 각종 기금적립 및 운용실적(최근 3년간)

“ 해당사항 없음 ”

14. 용역발주 현황(20백만원 이상)

□ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분		건 수	용역금액	비 고
총 계		275	91,910	◦기술용역 212건 ◦일반용역 63건
경영관리과	소 계	4	143	◦기술용역 0건 ◦일반용역 4건
	2023년	2	66	◦기술용역 -건 ◦일반용역 2건
	2024년	2	77	◦기술용역 -건 ◦일반용역 2건
상수도부	소 계	141	28,811	◦기술용역 103건 ◦일반용역 38건
	2023	92	20,385	◦기술용역 81건 ◦일반용역 11건
	2024	49	8,426	◦기술용역 22건 ◦일반용역 27건
하수도부	소 계	121	55,708	◦기술용역 106건 ◦일반용역 15건
	2023년	75	21,429	◦기술용역 69건 ◦일반용역 6건
	2024년	46	34,279	◦기술용역 37건 ◦일반용역 9건
현대화 추진단	소 계	9	7,248	◦기술용역 3건 ◦일반용역 6건
	2023년	5	2,600	◦기술용역 1건 ◦일반용역 4건
	2024년	4	4,648	◦기술용역 2건 ◦일반용역 2건

□ 2023년

(단위 : 백만원)

구 분	용역명	용역금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약방법	계약근거	용역결과 활용상황
경영 관리과	상하수도 요금관리 프로그램 유지관리 용역	44	상하수도 요금관리 프로그램 유지관리 1식	(주)한일아이앤씨	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	일반용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조제1항 제4호	프로그램 유지관리
	수도사업특별회계 통합회계관리 프로그램 유지관리 용역	22	수도사업특별회계 통합회계관리 프로그램 유지관리 1식	(주)대양컴퓨터정보	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	일반용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조제1항 제4호	프로그램 유지관리
상수도부	2023년 노로바이러스 및 병원성 미생물 분포 실태조사 용역	453	미생물 분포 실태조사 1식	DK EcoV 환경미생물연구소	2023.03.07. ~ 2023.12.31. (2023.03.07.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	실태 조사
	상수도 시설사업(동홍지구) 실시설계 용역	95	실시설계 1식	㈜ 제이디엘이엔씨	ʼ23.03.17. ~ ʼ23.12.18. (ʼ23.03.15.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	공사발주
	원인자부담금(화북상업지구) 배수지 시설공사 실시설계용역	85	실시설계 1식	(주)인트랜	ʼ23.04.25. ~ ʼ23.12.13. (ʼ23.04.25.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	공사발주
	원인자부담금(구좌농공단지) 상수도 시설공사 GIS DB 구축 용역	33	GIS DB 구축	㈜아성 공간정보	2023.05.02. ~ 2023.12.05. (2023.05.02.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB 구축
	원인자부담금(구좌농공단지) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	63	폐기물처리용역 1식	성진 산업(주)	ʼ23.05.08. ~ ʼ23.10.31. (ʼ23.05.08.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물 처리
	원인자부담금(용담이동) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	23	폐기물처리용역 1식	한라환경산업㈜	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.13. (ʼ23.05.19.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물 처리
	원인자부담금(외도이동) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	35	폐기물처리용역 1식	서광산업㈜	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.13. (ʼ23.05.19.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물 처리
	교래지구 도수관로 시설공사 GIS DB 구축용역	20	GIS DB 구축	㈜창인 이엔지	ʼ23.06.21. ~ ʼ24.02.15. (ʼ23.06.21.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB 구축
	원인자부담금(화북상업지구) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	38	폐기물처리용역 1식	㈜더존 환경	ʼ23.06.23. ~ ʼ25.01.26. (ʼ23.06.23.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물 처리
	원인자부담금(화북상업지구) 상수도 시설공사 GIS DB구축 용역	53	GIS DB 구축	㈜ 제이시스	ʼ23.06.23. ~ ʼ25.01.26. (ʼ23.06.23.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB 구축
상수도부	외도수원지 외 2개소 상수원보호구역 일부 해제 용역	44	상수원보호구역 해제용역 1식	㈜산들엔	ʼ23.07.19. ~ (ʼ23.07.19.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	보호구역 해제 관련 환경부 협의시 활용
	교래지구 전기공사 감리용역	45	감리용역 1식	㈜ 마루이엔지	ʼ23.07.27. ~ ʼ24.02.19. (ʼ23.07.27.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	공사감리 실시
	동부지역(대흘, 교래) 취수원 개발사업 지하수 영향조사 용역	92	지하수영향조사 1식	㈜웨리트 제주	ʼ23.09.22. ~ ʼ23.12.20. (ʼ23.09.22.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	지하수관리분과위원회 심의 활용
	광평지구 취수원 개발사업 지하수 영향조사 용역	53	지하수영향조사 1식	㈜기반 이엔씨	ʼ23.09.25. ~ ʼ23.12.20. (ʼ23.09.25.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	지하수관리분과위원회 심의 활용
	한림정수장 고도정수처리시설 내 배출수처리시설 종합시운전 용역	287	종합시운전용역 1식	㈜바이오워터	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.05.05. (ʼ22.12.30.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업시행
	2023년 상수도시설물(8구역) 전기안전관리대행 용역	36	상수도시설물 전기안전관리대행 용역 1식	(주)우림전기안전관리	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 유지관리
	2023년 상수도시설물(7구역) 전기안전관리대행 용역	37	상수도시설물 전기안전관리대행 용역 1식	탐라전기안전관리	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 유지관리
	2023년 상수도시설물(6구역) 전기안전관리대행 용역	35	상수도시설물 전기안전관리대행 용역 1식	남부전기기술단	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 유지관리
	2023년 상수도시설물(5구역) 전기안전관리대행 용역	36	상수도시설물 전기안전관리대행 용역 1식	남부전기기술단	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 유지관리
	2023년 상수도시설물(4구역) 전기안전관리대행 용역	36	상수도시설물 전기안전관리대행 용역 1식	에스엠이엔지㈜	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 유지관리
	2023년 상수도시설물(3구역) 전기안전관리대행 용역	40	상수도시설물 전기안전관리대행 용역 1식	㈜신원 엔지니어링	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 유지관리
	2023년 상수도시설물(2구역) 전기안전관리대행 용역	37	상수도시설물 전기안전관리대행 용역 1식	남부전기기술단	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 유지관리
	2023년 상수도시설물(1구역) 전기안전관리대행 용역	39	상수도시설물 전기안전관리대행 용역 1식	(주)우림전기안전관리	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 유지관리
상수도부	2023년 강정정수장 수처리조 및 용흥가압장 배수지 청소	20	배수지 청소 1식	한국위생방역	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.01.30. (ʼ23.01.10.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조5호(1인견적)	배수지 청소
	2023년 상수도부 소관 정수장(15개소) 방역소독 용역	49	방역소독 용역 1식	벨킨스	ʼ23.01.16. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.16.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	정수장 방역 소독
	구좌.성산유역 상수도 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사용역	145	지하수 영향허가에 따른 지하수 영향조사용역 1식	㈜삼화 엔지니어링	ʼ23.01.16. ~ ʼ23.09.12. (ʼ23.01.16.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	2023년 상수도 지하수관정 이용실태 및 사후관리용역	115	지하수관정 이용실태 조사 1식	㈜ 남천개발	ʼ23.01.19. ~ ʼ23.11.14. (ʼ23.01.19.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	지하수관정 사후 관리
	남원유역 상수도 지하수 기간연장에 따른 지하수영향조사 용역	108	지하수 영향조사용역 1식	㈜ 디케이엘	ʼ23.01.19. ~ ʼ23.09.15. (ʼ23.01.19.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	한경.표선유역 상수도 지하수 기간연장에 따른 지하수영향조사 용역	112	지하수 영향조사용역 1식	(주)웅지산업개발	ʼ23.01.20. ~ ʼ23.09.16. (ʼ23.01.20.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	조천정수장 고도정수처리시설사업 기본 및 실시설계 설계경제성 등 검토(VE)용역	20	설계 경제성검토 1식	㈜ 씨엠누리	ʼ23.01.26. ~ ʼ23.03.26. (ʼ23.01.26.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	강정정수장 현대화사업 소규모 환경영향평가용역	50	환경영평가 1식	㈜영아리환경기술	ʼ23.01.30. ~ ʼ23.10.05. (ʼ23.01.30.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	강정정수장 현대화사업 소규모 재해영향성 검토 및 평가용역	73	건설재해예방기술지도 1식	㈜해오름엔지니어링	ʼ23.01.30. ~ ʼ23.05.29. (ʼ23.01.30.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	재해예방 기술지도 추진
	애월(소길블록) 노후상수도관 교체공사 폐기물처리용역	27	폐기물처리 1식	서광산업㈜	ʼ23.01.30. ~ ʼ23.03.30. (ʼ23.01.30.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	폐기물처리
	어승생정수장(서부간선) 송수관로 긴급복구공사 GIS DB구축 용역	42	GIS DB구축 1식	(주)창인이엔지	ʼ23.02.24. ~ ʼ23.08.22. (ʼ23.02.24.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	취·정수장 노후 수배전반(제어반) 교체 및 비상발전기 설치 전기공사 실시설계 용역	32	상수도 시설 실시설계 1식	㈜제이렉	ʼ23.03.07. ~ ʼ23.06.14. (ʼ23.03.07.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	서귀포시 상예수원지 취수량 급감에 따른 긴급 상수도 관로 연결공사 실시설계 용역	20	상수도 시설 실시설계 1식	㈜길토목설계사무소	ʼ23.04.05. ~ ʼ23.05.04. (ʼ23.04.05.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	2023년도 상수관망 블록화시스템 유량 현장전송반 유지보수관리용역	20	현장전송반 유지관리용역 1식	㈜테크원시스템	ʼ23.04.13. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.04.13.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	유지 관리
상수도부	외도 산지천 생태하천복원사업 모니터링용역(2차)	47	모니터링 1식	㈜영아리환경기술	ʼ23.04.19. ~ ʼ24.01.13. (ʼ23.04.19.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	소규모 수도시설(우도지구) 상수도시설공사 폐기물처리용역	33	폐기물처리 1식	동남산업 ㈜	ʼ23.04.24. ~ ʼ23.10.20. (ʼ23.04.24.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	농어촌생활용수 급수취약지역(애월지구) 상수도 시설공사 GIS DB구축 용역	59	GIS DB구축 1식	㈜ 제이시스	ʼ23.04.25. ~ ʼ23.02.18. (ʼ23.04.25.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	소규모 수도시설(표선지구) 상수도시설 개량사업 GIS DB구축 용역	25	GIS DB구축 1식	제이아이엔시스템 ㈜	ʼ23.04.25. ~ ʼ23.12.20. (ʼ23.04.25.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	농어촌생활용수 급수취약지역(한경지구) 상수도 시설공사 폐기물처리 용역	70	폐기물처리 1식	㈜청봉환경	ʼ23.04.26. ~ ʼ23.12.21. (ʼ23.04.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	소규모 수도시설(조천지구) 상수도시설 개량사업 폐기물처리 용역	40	폐기물처리 1식	㈜청봉환경	ʼ23.04.26. ~ ʼ23.12.21. (ʼ23.04.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	소규모 수도시설(조천지구) 상수도시설공사 GIS DB구축용역	36	GIS DB구축 1식	㈜현무 이앤지	ʼ23.04.26. ~ ʼ24.02.19. (ʼ23.04.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	소규모 수도시설(표선지구) 상수도시설 개량사업 폐기물처리 용역	44	폐기물처리 1식	일승산업㈜	ʼ23.04.26. ~ ʼ23.10.22. (ʼ23.04.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	소규모 수도시설(성산지구) 상수도시설공사 GIS DB구축용역	25	GIS DB구축 1식	㈜현무 이앤지	ʼ23.04.26. ~ ʼ23.12.21. (ʼ23.04.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	농어촌생활용수 급수취약지역(한림지구) 상수도시설공사 GIS DB구축용역	26	GIS DB구축 1식	(주)에이오디	ʼ23.04.27. ~ ʼ23.12.22. (ʼ23.04.27.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	농어촌생활용수 급수취약지역(구좌지구) 상수도시설공사 폐기물처리용역	23	폐기물처리 1식	제주산업 ㈜	ʼ23.04.27. ~ ʼ23.10.23. (ʼ23.04.27.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	농어촌생활용수 급수취약지역(한경지구) 상수도시설공사 GIS DB구축용역	47	GIS DB구축 1식	㈜가온 도시정보	ʼ23.04.27. ~ ʼ24.02.20. (ʼ23.04.27.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	소규모 수도시설(성산지구) 상수도시설 개량사업 폐기물처리 용역	57	폐기물처리 1식	정우산업개발(주)	ʼ23.04.28. ~ ʼ23.10.24. (ʼ23.04.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	농어촌생활용수 급수취약지역(애월지구) 상수도 시설공사 폐기물처리 용역	65	폐기물처리 1식	정우산업개발(주)	ʼ23.04.28. ~ ʼ23.12.23. (ʼ23.04.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
상수도부	2023년 상수도 수질계측기 유지관리 용역	216	유지관리 용역 1식	제이텍	ʼ23.04.28. ~ ʼ24.03.28. (ʼ23.04.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	유지 관리
	삼양1,2수원지 노후 수배전반 교체 전기공사 감리용역	49	감리용역 1식	㈜고산전력	ʼ23.05.12. ~ ʼ23.11.27. (ʼ23.05.12.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	조천읍 신흥 소블록 긴급 누수탐사 용역	20	누수탐사 1식	(주)에이치앤텍	ʼ23.06.02. ~ ʼ23.07.01. (ʼ23.06.02.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	2023년 읍면지역 상수도 시설 정비공사 실시설계 용역	20	상수도 시설 실시설계 1식	㈜제이에스토목설계사무소	ʼ23.06.02. ~ ʼ23.08.30. (ʼ23.06.02.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	봉개2호배수지 외 2개소 배수지 철거공사 폐기물처리용역	26	폐기물처리 1식	이도에코표선㈜	ʼ23.06.02. ~ ʼ23.08.30. (ʼ23.06.02.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	폐기물처리
	도서지역(가파,마라) 해수담수화시설 개량·증설사업 기본 및 실시설계 용역	1303	상수도 시설 실시설계 1식	㈜한국 종합기술	ʼ23.06.21. ~ ʼ24.04.15. (ʼ23.06.21.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	2023년 광역상수도2단계 시설물 정밀안전점검 용역	91	안전점검 1식	디앤이구조엔지니어링㈜	ʼ23.06.23. ~ ʼ23.10.20. (ʼ23.06.23.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	삼양·함덕광역수원 노후 수배전반 교체 전기공사 감리용역	40	감리용역 1식	(주)종합전기기술사사무소	ʼ23.06.23. ~ ʼ24.01.08. (ʼ23.06.23.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	상수관로 비축자재 구입 및 운반용역	20	자재구입 및 운반 1식	㈜아람건설	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.09.24. (ʼ23.06.27.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	자재 운반
	2023년 광역상수도 1단계 시설물 정밀안전점검 용역	96	안전점검 1식	㈜바로 구조건축사사무소	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.10.24. (ʼ23.06.27.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	시설물 유지 관리
	2023년 지방상수도 시설물 정밀안전점검 용역	99	안전점검 1식	㈜베스트 안전진단	ʼ23.07.12. ~ ʼ23.11.08. (ʼ23.07.12.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	2023년 취,정수장 염소투입기 유지관리 용역	30	유지관리용역 1식	㈜제이텍 워터	ʼ23.09.01. ~ ʼ23.11.08. (ʼ23.12.31.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	유지관리용역
	강정정수장 현대화사업 기본 및 실시설계 문화재 정밀발굴조사 용역	173	정밀발굴조사 용역 1식	㈜ 태신 엔지니어링 건축사사무소	ʼ23.10.10. ~ ʼ24.04.12. (ʼ23.10.10.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	정밀발굴조사 용역
	서광정수장 비상발전기 설치 전기공사 감리용역	42	전기공사 감리용역 1식	신아 이엔씨㈜	ʼ23.11.01. ~ ʼ24.02.28. (ʼ23.11.01.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기공사 감리용역
	토평정수장 고도정수처리시설사업 건설사업관리용역 (전체분)	2,231	건설사업관리용역 1식	㈜한국 종합기술	ʼ23.11.08. ~ ʼ25.11.06. (ʼ23.11.08.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	건설사업관리용역
상수도부	조천정수장 고도정수처리시설사업 건설사업관리용역 (전체분)	4,056	건설사업관리용역 1식	㈜도화엔지니어링	ʼ23.12.12. ~ ʼ26.12.15. (ʼ23.12.12.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	건설사업관리용역
	강정정수장 현대화사업 건설사업관리용역 (전체분)	3,922	건설사업관리용역 1식	㈜도화엔지니어링	ʼ23.12.12. ~ ʼ26.12.10. (ʼ23.12.12.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	건설사업관리용역
	오라가압장 노후 수배전반 교체 전기공사 감리용역	32	전기공사 감리용역 1식	㈜제이렉	ʼ23.11.28. ~ ʼ24.02.05. (ʼ23.11.28.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	전기공사 감리용역
	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선사업 실시설계용역	44	상수도 시설 실시설계 1식	㈜인트랜	ʼ23.01.19. ~ ʼ23.02.17. (ʼ23.01.19.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	2023년 구좌읍 송당리 상수도관 개선공사 실시설계 용역	29	상수도 시설 실시설계 1식	㈜인트랜	ʼ23.02.27. ~ ʼ23.05.07. (ʼ23.02.27.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사 GIS DB구축용역	31	GIS DB구축 1식	㈜지오트윈공간정보	ʼ23.05.16. ~ ʼ23.12.17. (ʼ23.05.16.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사 폐기물처리 용역	47	폐기물처리 1식	이도에코제주㈜	ʼ23.05.16. ~ ʼ23.11.11. (ʼ23.05.16.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	제주시 조천읍 대블록 긴급 누수탐사 용역	85	누수탐사 1식	(주)에이치앤텍	ʼ23.06.15. ~ ʼ23.12.21. (ʼ23.06.15.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	조천지역 급수관로 GIS DB구축 용역	44	GIS DB구축 1식	제이아이엔시스템 ㈜	ʼ23.06.16. ~ ʼ23.10.13. (ʼ23.06.16.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	제주특별자치도 애월읍 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	1,370	상수도 시설 실시설계 1식	㈜도화 엔지니어링	ʼ23.06.20. ~ ʼ24.06.18. (ʼ23.06.20.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	남원대블록 유수율제고 용역(2차분)	717	누수탐사 1식	㈜한국 빅텍	ʼ23.07.04. ~ ʼ24.06.20. (ʼ23.07.04.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	표선대블록 유수율제고 용역(2차분)	449	누수탐사 1식	㈜한국 빅텍	ʼ23.07.04. ~ ʼ24.06.20. (ʼ23.07.04.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사 페기물처리용역	40	폐기물처리 1식	이도에코제주㈜	ʼ23.07.11. ~ ʼ24.03.12. (ʼ23.07.11.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
상수도부	송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사 GIS DB구축 용역	79	GIS DB구축 1식	㈜에이오디	ʼ23.07.11. ~ ʼ24.05.11. (ʼ23.07.11.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	한경면 조수(소) 판포계통 상수관망 개선사업 폐기물처리용역	80	폐기물처리 1식	제주산업㈜	ʼ23.07.17. ~ ʼ24.01.12. (ʼ23.07.17.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	한경면 조수(소) 판포계통 상수관망 개선사업 GIS DB 구축 용역	79	GIS DB구축 1식	㈜창인 이엔지	ʼ23.07.17. ~ ʼ24.03.12. (ʼ23.07.17.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	제주특별자치도 중점관리대상지역 채수 용역	116	수돗물 채수 1식	㈜상아 엔지니어링	ʼ23.07.18. ~ ʼ24.03.13. (ʼ23.07.18.)	일반용역	수의계약	지방계약법 (026조 01항 00호 0-목)	수질 검사
	송당리 마을안길 노후상수관로 교체공사 GIS DB 구축용역	34	GIS DB구축 1식	㈜글로베이	ʼ23.07.28. ~ ʼ24.06.15. (ʼ23.07.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	GIS DB구축
	송당리 마을안길 노후상수관로 교체공사 폐기물처리용역	50	폐기물처리 1식	흥남개발㈜	ʼ23.07.28. ~ ʼ24.04.16. (ʼ23.07.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	조천소블록(소공원) 상수관망 긴급개선공사 GIS DB 구축용역	26	GIS DB구축 1식	㈜글로베이	ʼ23.08.01. ~ ʼ23.10.29. (ʼ23.08.01.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	GIS DB구축
	2023년 성산대블록 누수탐사 용역	190	누수탐사 1식	㈜삼화	ʼ23.08.03. ~ ʼ24.03.31. (ʼ23.08.03.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	2023년 구좌대블록 누수탐사 용역	191	누수탐사 1식	(주)에이치앤텍	ʼ23.08.03. ~ ʼ24.02.28. (ʼ23.08.03.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	효율적인 유수율 향상방안 연구용역	250	유수율 향상방향 연구 1식	(사) 대한상하수도학회	ʼ23.08.23. ~ ʼ24.08.16. (ʼ23.08.23.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	사업 시행
	2023년 조천읍 대블록 누수탐사 용역	140	누수탐사 1식	㈜에이치앤택	ʼ23.09.11. ~ ʼ23.12.29. (ʼ23.09.11.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업 시행
	2023년 제주특별자치도 상수도 유량계 교정 용역	205	상수도 유량계 검교정 1식	디와이플로우테크 ㈜	ʼ23.11.06. ~ ʼ24.03.04. (ʼ23.11.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	유량계 교정
	애월대블록 유수율 유지관리 용역(2차분)	478	유수율 유지관리 1식	㈜한국 빅텍	ʼ23.12.29. ~ ʼ24.12.28. (ʼ23.12.29.)	기술용역	일반 경쟁	지방계약법 시행령 12조	시업 시행
하수도부	2023년 서귀포 지역(좁은 골목길 등) 분뇨 수집운반 용역	48	분뇨수집운반 1식	대신위생운수사	ʼ23.02.10. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.02.10.)	일반용역	수의 2인이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	분뇨 수집운반
	남원하수처리장 노후차집관로 정비사업 건설사업관리용역 23년도	517	건설사업관리 1식	㈜수성엔지니어링	ʼ23.03.27. ~ ʼ23.08.25. (ʼ23.03.27.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	성산하수처리구역 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2023년 시행분	833	기본 및 실시설계 1식	㈜이산	ʼ23.06.13. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.06.12.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수도정비 사업 시행
	성산3 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 23년 시행분	425	건설사업관리 1식	주식회사 동성엔지니어링	ʼ22.12.17. ~ ʼ23.12.16. (ʼ22.12.17.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	성산3 하수관로 정비공사(2공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역 23년 시행분	51	CCTV조사 및 수밀시험 1식	㈜삼호건설	ʼ23.06.19. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.06.19.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	관로 내부조사
	성산3 하수관로 정비공사(3공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역 23년 시행분	33	CCTV조사 및 수밀시험 1식	정진건설주식회사	ʼ23.06.19. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.06.19.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	관로 내부조사
	성산3 하수관로 정비공사(2공구) GIS DB구축용역 23년 시행분	34	GIS DB구축 1식	주식회사 글로베이	ʼ23.06.19. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.06.19.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	성산3 하수관로 정비공사(3공구) GIS DB구축 용역 23년 시행분	21	GIS DB구축 1식	주식회사 제이시스	ʼ23.06.19. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.06.19.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	서귀포시 성산처리구역 하수관망도(지선, 간선)	45	GIS DB구축 1식	주식회사지오트윈공간정보	ʼ23.03.29. ~ ʼ23.07.26. (ʼ23.03.29.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목	GIS DB구축
	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구) GIS DB구축 용역	67	GIS DB구축 1식	주식회사 이레정보	ʼ23.07.12. ~ ʼ26.07.11. (ʼ23.07.12.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB구축
	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구) CCTV조사 및 수밀검사용역	23	CCTV조사 및 수밀검사 1식	㈜효경 건설	ʼ23.07.18. ~ ʼ26.07.17. (ʼ23.07.18.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목	관로 내부조사
	서귀포 중문관광단지 노후하수관로 정비사업 건설사업 관리용역 22년 시행분	569	건설사업관리 1식	㈜동명기술공단	ʼ22.01.03. ~ ʼ22.12.29. (ʼ22.01.23.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업 사후지하안전영향조사용역 23년 시행분	42	지하안전영향 조사 1식	(주)기반이엔씨	ʼ23.01.01. ~ ʼ23.12.28. (ʼ23.01.01.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수도 유지관리
하수도부	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 건설사업관리용역 23년 시행분	1,008	건설사업관리 1식	㈜동명기술공단	ʼ22.12.21. ~ ʼ24.11.18. (ʼ23.01.24.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 1공구 CCTV조사 및 수밀시험용역 23년 시행분	56	CCTV조사 및 수밀시험 1식	성빈건설(주)	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10. (ʼ23.01.11.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	관로 내부조사
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 2공구 CCTV조사 및 수밀시험용역 23년 시행분	90	CCTV조사 및 수밀시험 1식	㈜한마음건설	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10. (ʼ23.01.11.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	관로 내부조사
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 3공구 CCTV조사 및 수밀시험용역 23년 시행분	34	CCTV조사 및 수밀시험 1식	성빈건설(주)	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10. (ʼ23.01.11.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	관로 내부조사
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 1공구 GIS DB구축 용역 23년 시행분	46	GIS DB구축 1식	㈜글로베이	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10. (ʼ23.01.11.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 2공구 GIS DB구축 용역 23년 시행분	32	GIS DB구축 1식	㈜아성공간정보	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10. (ʼ23.01.11.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사 GIS DB구축용역(2차분)	42	GIS DB구축 1식	㈜아성공간정보	ʼ23.05.02. ~ ʼ24.01.16. (ʼ23.05.02.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	안덕면 사계리 하수관로 정비사업 실시설계 용역	58	실시설계 1식	㈜제이피엠	ʼ23.01.26. ~ ʼ23.05.10. (ʼ23.01.25.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	공사발주
	대정하수처리장 차집관로 정비사업 등 통합건설사업 관 리용역(4차분)	214	건설사업관리 1식	㈜삼안	ʼ23.02.07. ~ ʼ23.09.30. (ʼ23.02.07.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	대정하수처리구역 하수관망도(간선, 지간선병행)GIS DB 구축 용역	62	GIS DB구축 1식	㈜이레정보	ʼ23.05.03. ~ ʼ23.08.30. (ʼ23.05.03.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB구축
	대정하수처리구역 불명수 유입 조사용역(연막시험)	48	연막시험 16km	㈜정진건설	ʼ23.07.12. ~ ʼ23.11.11. (ʼ23.07.11.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목	관로 내부조사
하수도부	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 건설사업 관리용역 23년 시행분	185	건설사업관리 1식	㈜동성엔지니어링	ʼ22.12.16. ~ ʼ23.05.31. (ʼ23.01.19.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구,6차분) CCTV 조사 및 공기압시험용역	21	CCTV 조사 0.7km 등	강산토건(주)	ʼ23.03.29. ~ ʼ23.12.15. (ʼ23.03.27)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조	관로조사
	남원공공하수처리시설 증설사업 준공식 행사대행 용역	28	준공식 행사대행 1식	제주 늘푸른 (진명순)	ʼ23.09.22. ~ ʼ23.10.05. (ʼ23.09.22)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	준공식 행사추진
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구, 6차분) 폐기물처리용역	108	폐콘 1,642톤 폐아스콘 1,382톤 절삭아스콘 648톤	일승산업(주) (손승민)	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.12.15. (ʼ23.04.18.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구, 6차분) 혼합폐기물처리용역	25	혼합 68톤	한라환경산업(주) (현기숙)	ʼ23.08.29. ~ ʼ23.10.31. (ʼ23.08.29.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조	폐기물처리
	남원처리구역 하수관로 정비사업 (2단계_2공구) 건설폐기물 처리용역	80	콘크리트 709톤 아스콘 1,244톤 혼합 1톤	제주산업(주) (부공환)	ʼ23.11.03. ~ ʼ23.12.15. (ʼ23.11.03.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	남원처리구역 하수관로 정비사업 (2단계_3공구) 건설폐기물 처리용역	75	콘크리트 849톤 아스콘 973톤 혼합 3톤	서귀포산업(주) (김상균)	ʼ23.11.03. ~ ʼ23.12.15. (ʼ23.11.03.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	남원처리구역 하수관로 정비사업 (2단계_2공구,2023) CCTV조사 및 수밀시험용역	42	하수관 및 맨홀 공기압시험 44개소 하수관내 CCTV 2,029m	마성토건(주) (최영란)	ʼ23.05.31. ~ ʼ23.12.16. (ʼ23.05.31.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목	관로 내부조사
	남원처리구역 하수관로 정비사업 (2단계_3공구,2023) CCTV조사 및 수밀시험용역	54	하수관내 CCTV1,605m 소구경 3,826m 하수관공기압34개소 맨홀 공기압 33개소 연막시험 54개소	㈜성광산업 (고정관)	ʼ23.06.09. ~ ʼ23.12.16. (ʼ23.06.09.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목	관로내부조사
	남원처리구역 하수관로 정비사업 (2단계_2공구) GIS DB구축 용역	152	하수관로 조사 및 측량 6.99km	㈜이례정보 (최은진)	ʼ23.06.27. ~ ʼ26.06.26. (ʼ23.06.27.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB구축
	남원처리구역 하수관로 정비사업 (2단계_3공구) GIS DB구축 용역	174	하수관로 조사 및 측량 8.20km	㈜에이오디 (공주삼)	ʼ23.06.27. ~ ʼ26.06.26. (ʼ23.06.27.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB구축
하수도부	제주시 추자면 하수관로 기술진단 용역	87	기술진단 1식	㈜태량	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.09.24. (ʼ23.06.22.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	시설물 현황조사 및 운영관리 현황조사
	제주시 추자면 대서리 외 4개소 공공하수처리시설 기술진단용역	112	기술진단1식	㈜포웰	ʼ23.07.11. ~ ʼ24.06.26. (ʼ23.07.03.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	시설물 현황조사 및 운영관리 현황조사
	오라·아라 하수관로 정비사업(3공구) CCTV 조사 및 수밀시험용역 2023년도 시행분	60	CCTV조사 및 수밀시험 1식	강산토건(주)	ʼ23.01.09. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.09.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	관로 내부조사
	서부처리구역 차집관로 정비사업 실시설계용역 ʼ23년	768	실시설계용역 1식	주식회사 한국종합기술	ʼ23.01.01. ~ ʼ23.08.26. (ʼ22.06.02.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수도정비사업 시행
	서부처리구역 하수관로 정비공사(2단계-하귀2리 2공구) GIS DB구축용역	10	GIS DB구축 1식	주식회사 가온도시정보	ʼ23.04.05. ~ ʼ23.12.04. (ʼ23.04.05.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목	GIS DB구축
	서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계-4공구) GIS DB구축용역 ʼ23년	28	GIS DB구축 1식	주식회사 이레정보	ʼ23.04.28. ~ ʼ23.12.20. (ʼ23.04.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB구축
	서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계-1공구) GIS DB구축용역 ʼ23년	41	GIS DB구축 1식	주식회사 가온도시정보	ʼ23.05.11. ~ ʼ23.12.20. (ʼ23.05.11.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB구축
	서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계-1공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역 ʼ23년도	52	CCTV조사 및 수밀시험 1식	대명건설주식회사	ʼ23.04.13. ~ ʼ23.12.20. (ʼ23.04.10.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	관로 내부조사
	서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계-4공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역 ʼ23년도	36	CCTV조사 및 수밀시험 1식	혜명환경건설주식회사	ʼ23.05.11. ~ ʼ23.12.20. (ʼ23.05.11.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	관로 내부조사
	서부처리구역 하수관로 정비공사(2단계-하귀2리2공구)CCTV조사 및 수밀시험 용역 ʼ23년도	23	CCTV조사 및 수밀시험 1식	강산토건주식회사	ʼ23.05.11. ~ ʼ23.11.23. (ʼ21.07.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	관로 내부조사
	서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계-2공구) 건설공사 산업재해 예방지도 용역	17	건설공사 산업재해 예방지도 용역 1식	주식회사 제이제이안전	ʼ23.06.30. ~ ʼ26.06.29. (ʼ23.06.30.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목	산업재해 기술지도
하수도부	서부하수처리구역(저지·청수~판포간) 차집관로 정비사업 건설공사 산업재해 예방지도 용역	16	건설공사 산업재해 예방지도 용역 1식	제일세이프티주식회사	ʼ23.06.30. ~ ʼ25.12.29. (ʼ23.06.30.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목	산업재해 기술지도
	한림 비양도 소규모 하수관로 정비공사 GIS DB구축용역	8	GIS DB구축 1식	㈜가온도시정보	ʼ23.03.13. ~ ʼ23.09.8. (ʼ23.03.13.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 8호 사목	GIS DB구축
	조천처리분구 하수관로 정비사업(1공구) GIS DB 구축용역	105	GIS DB구축 1식	㈜가온도시정보	ʼ22.03.20. ~ ʼ24.09.19. (ʼ23.03.20.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB 구축
	동부하수처리구역 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	1,578	기본 및 실시설계용역 1식	㈜동명기술공단종합건축사사무소	ʼ23.06.15. ~ ʼ24.06.14. (ʼ23.06.15.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수도정비 사업 시행
	서부처리구역 하수관로 정비(2단계-1공구) 전기공사 재해예방 기술지도 용역	11	건설재해예방 기술지도 1식	㈜한국전기공사협회 안전기술원	ʼ23.08.21. ~ ʼ25.08.20. (ʼ23.08.21.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목	산업재해 기술지도
	서부(판포)하수처리장 증설사업 건설사업관리용역 (2023년 시행분)	913	건설사업관리 1식	㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 2개사	ʼ22.12.25. ~ ʼ23.12.24. (ʼ23.01.10)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사건설사업관리용역 ʼ23년 시행분	607	건설사업관리 1식	주식회사 수성엔지니어링	ʼ22.12.17. ~ ʼ23.11.19. (ʼ23.01.02.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	관로 내부조사
	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형2공구) GIS DB구축 용역	60	GIS DB 구축 1식	㈜글로배이	ʼ23.03.27. ~ ʼ24.01.26. (ʼ23.03.20.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB구축
	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형1공구) GIS DB구축 용역	41	21.04.12 ~22.5.31 (23.03.20)	강산토건㈜	ʼ23.03.27. ~ ʼ24.01.26. (ʼ23.03.27.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목	GIS DB구축
	23년 제주하수운영과 동부,서부하수처리장 수질원격감시스템(TMS)유지관리 용역	61	TMS 유지관리 1식	제이텍	ʼ23.01.31. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.31.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제26조 2항	시설물 유지관리
	23년 제주시지역 동부·서부 하수처리장 슬러지 운반 및 처리용역	2,095	하수슬러지 운반 및 처리 1식	㈜흥주농업회사법인	ʼ23.01.20. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.20.)	일반용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수슬러지 운반 및 처리
	23년 동부하수처리장 및 중계펌프장 전기안전관리대행용역	34	전기안전관리	㈜대한전기안전관리	ʼ23.01.09. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.09.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	전기시설물 안전관리
하수도부	23년 동부하수처리장 노후 차집관로 CCTV 조사용역	41	CCTV 조사	삼호건설 (주)	ʼ23.03.09. ~ ʼ23.06.06. (ʼ23.03.09.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목	관로 내부조사
	서부 하수처리 구역 제1라인 중계펌프장 전기안전관리대행 용역	21	유지관리용역 1식	도암엔지니어링	ʼ23.01.25. ~ ʼ23.12.26. (ʼ23.01.25.)	기술용역	일반경쟁	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준	중계펌프장 전기안전관리
	서부 하수처리 구역 제2라인 중계펌프장 전기안전관리대행 용역	21	유지관리용역 1식	남부전기기술단	ʼ23.01.25. ~ ʼ23.12.26. (ʼ23.01.25.)	기술용역	일반경쟁	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준	중계펌프장 전기안전관리
	곽지중계펌프장 차집(압송)관로 이설공사 실시설계용역	262	실시설계용역 1식	용우종합건설	ʼ23.05.16. ~ ʼ23.08.04. (ʼ23.05.16.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 30조	차집관로 이설공사 실시
	동부, 서부하수처리장 및 소규모 공공하수처리시설 수질관리 및 수처리공정 컨설팅용역(1차분)	836	수질관리 및 수처리공정 컨설팅 1식	대양엔바이오(주)	ʼ23.02.21. ~ ʼ24.02.20. (ʼ23.02.21.)	기술용역	협상에의한계약	지방계약법 시행령 제43조 1항	수질관리 및 수처리공정 컨설팅
	제주도 도서지역 소규모 공공하수처리시설 통합원격관리체계 구축사업 실시설계용역	285	실시설계용역 1식	㈜현이엔지	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.12.23. (ʼ23.01.10.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	통합원격관리체계 구축 실시설계
	ʼ23년 서귀포지역 내 하수슬러지 운반·처리용역	334	하수슬러지 운반 및 처리 1식	주식회사 제이엔이	ʼ23.01.04. ~ ʼ23.01.20. (ʼ23.01.04.)	일반용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 2호 긴급	하수슬러지 운반 및 처리
	ʼ23년 서귀포지역 내 하수슬러지 운반·처리용역	4,471	하수슬러지 운반 및 처리 1식	주식회사 제이엔이	ʼ23.01.20. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.20.)	일반용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제26조 1항(2회유찰)	하수슬러지 운반 및 처리
	보목하수처리장 분리막 계외세정 용역	144	분리막 계외세정 용역 1식	주식회사 한울이엔텍	ʼ23.02.06. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.02.06.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제22조	분리막 계외세정
	ʼ23년 서귀포하수운영과 수질원격감시시스템(TMS)유지관리 용역	128	수질원격감시 시스템 유지관리 1식	제이텍	ʼ23.01.13. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.13.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제26조 3항	시설물 유지관리
	ʼ23년 서귀포지역 공공하수처리시설 운영관리 및 수처리공정 컨설팅용역	1,485	운영관리 및 수처리공정 컨설팅 1식	주식회사 이산	ʼ22.01.13. ~ ʼ23.12.31. (ʼ22.01.13.)	일반용역	일반 (총액)협상에의한계약	지방계약법 시행령 제43조 1항	운영관리 및 수처리공정 컨설팅
	색달하수처리장 수처리용 여과설비 교체공사 실시설계 용역	44	실시설계용역 1식	㈜인트랜	ʼ23.03.09. ~ ʼ23.05.07. (ʼ22.03.09.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목	여과설비 교체
	남원하수처리장 탈취설비 유지관리 용역	20	탈취설비 유지관리 1식	태일환경 관리(주)	ʼ23.01.13. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.13.)	기술용역	수의 계약	지방계약법 시행령 제12조	탈취설비 유지관리
	남원하수처리장 공공하수도 기술진단 용역	63	본처리장 및 펌프장 기술진단 1식	유한회사 장강	ʼ23.08.04. ~ ʼ23.11.06. (ʼ23.08.01.)	기술용역	일반경쟁	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준	하수처리장 시설물 유지관리
하수도부	ʼ23년 서귀포 지역(좁은 골목길 등) 분뇨 수집운반 용역	48	분뇨수집운반 1식	대신위생운수사	ʼ23.02.10. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.02.10.)	일반용역	수의 2인이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	분뇨 수집운반
	동부, 서부하수처리장 및 소규모 공공하수처리시설 수질관리 및 수처리공정 컨설팅용역(1차분)	836	수질관리 및 수처리공정 컨설팅 1식	대양엔바이오(주)	ʼ23.02.21. ~ ʼ24.02.20. (ʼ23.02.21.)	기술용역	협상에의한계약	지방계약법 시행령 제43조 1항	수질관리 및 수처리공정 컨설팅
	제주도 도서지역 소규모 공공하수처리시설 통합원격관리체계 구축사업 실시설계용역	285	실시설계용역 1식	㈜현이엔지	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.07.20. (ʼ23.01.10.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	통합원격관리체계 구축 실시설계
현대화 추진단	제주공공하수처리시설 수질원격감시시스템 (TMS) 유지관리용역	31	수질원격감시 시스템(TMS) 유지관리 1식	제이텍	ʼ23.1.31. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.31.)	일반용역	수의 2인이상견적	지방계약법 시행령 제26조	수질원격 감시시스템 유지관리
	제주공공하수처리시설 수질관리 및 수처리공정 컨설팅 용역	669	하수처리장 운전상태(수질분석/운전인자)분석과 최적 운전 방안 제시 등	대양엔 바이오 주식회사	ʼ23.02.17. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.02.17.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제43조	하수처리장 운전상태 (수질분석/운전인자)분석과 최적 운전 방안 마련
	2023년 제주하수처리장 슬러지처리시설 정비 등에 따른 비상시 슬러지 운반 및 처리용역	434	하수슬러지 운반 처리 1식	(유)희성 이엔텍 외 4개사	ʼ23.03.13. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.03.13.)	일반용역	제한 경쟁	지방계약법 제9조	제주 하수처리장 발생 하수슬러지 운반 처리
	제주공공하수처리시설 주변지역 지원사업 계획수립 용역	132	·제주공공하수처리시설 주변지역 지원사업 계획 수립 ·공공하수처리시설 주변지역 주민지원사업 지원기준(안) 마련	(재)한국자치경제연구원	ʼ23.04.13. ~ ʼ24.01.12. (ʼ23.04.13.)	학술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 43조 1항	주변지역 지원사업 연차별 및 단계별 사업 추진
	2023년 제주하수처리장 임시 탈수시설 슬러지 운반 및 처리용역	1,334	하수슬러지 운반 처리 1식	㈜에코비트에너지정세외 4개사	ʼ23.08.11. ~ ʼ24.03.31. (ʼ23.08.11.)	일반용역	제한 경쟁	지방계약법 제9조	제주 하수처리장 발생 하수슬러지 운반 처리

□ 2024년

(단위 : 백만원)

구 분	용역명	용역금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역 종류	계약방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)
경영 관리과	상하수도 요금관리 프로그램 유지관리 용역	46	상하수도 요금관리 프로그램 유지관리 1식	(주)한일아이앤씨	ʼ24.01.03. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.03.)	일반용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조제1항 제4호	프로그램 유지관리
	수도사업특별회계 통합회계관리 프로그램 유지관리 용역	31	수도사업특별회계 통합회계관리 프로그램 유지관리 1식	(주)대양컴퓨터정보	ʼ24.01.03. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.03.)	일반용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조제1항 제4호	프로그램 유지관리
상수도부	동부지역 상수도 시설사업 실시설계용역	49	실시설계 1식	㈜인트랜	ʼ24.01.31.~ 용역일시정지 (ʼ24.01.29.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	공사발주
	2024년 노로바이러스 및 병원성 미생물 분포 실태조사 용역	454	미생물 분포 실태조사 1식	DK EcoV 환경미생물연구소	ʼ24.02.28. ~ ʼ24.12.31. (ʼ23.03.07)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	실태 조사
	원인자부담금(화북 상업지구) 배수지 시설공사 건설폐기물처리용역	60	폐기물처리용역 1식	㈜더존환경	ʼ24.06.05. ~ ʼ25.06.04. (ʼ24.06.05.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제30조	폐기물 처리
	서홍지구 상수관로 정비공사 건설폐기물처리용역	35	폐기물처리용역 1식	한라환경 산업 ㈜	ʼ24.06.19. ~ ʼ24.12.15. (ʼ24.06.19.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	폐기물 처리
	하효지구 상수관로 정비공사 건설폐기물처리용역	28	폐기물처리용역 1식	한라환경 산업㈜	ʼ24.06.19. ~ ʼ24.10.16. (ʼ24.06.19.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	폐기물 처리
	동홍지구 상수관로 정비공사 건설폐기물처리용역	60	폐기물처리용역 1식	동남산업㈜	ʼ24.06.25. ~ ʼ25.02.19. (ʼ24.06.25.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제30조	폐기물 처리
	원인자부담금(보성리) 상수도 시설사업 실시설계용역	81	실시설계 1식	㈜청풍 엔지니어링	ʼ24.07.01. ~ ʼ24.08.29. (ʼ24.07.01.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제30조	공사 발주 예정
	원인자부담금(하귀1리) 상수도 시설공사 건설폐기물처리용역	25	폐기물처리 1식	㈜청봉환경	ʼ24.08.26. ~ ʼ25.02.21. (ʼ24.08.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업시행
	강정정수장 현대화사업 착공식 행사 대행 용역	29	착공식 대행 용역 1식	제주 늘푸른	ʼ24.01.04. ~ ʼ24.01.10. (ʼ23.01.04.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조 및 30조	착공식 대행 용역
	2024년 취정수장 염소투입기 유지관리 용역	45	염소투입기 유지관리 용역 1식	㈜제이 텍워터	ʼ24.01.05. ~ ʼ24.12.31. (ʼ23.01.05.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조 및 30조	염소투입기 유지관리 용역
	2024년 상수도시설물(2구역) 전기안전관리대행 용역	93	전기안전관리대행용역 1식	㈜썬텍 제주	ʼ24.01.09. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.09.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	전기안전관리대행 용역
상수도부	2024년 상수도시설물(3구역) 전기안전관리대행 용역	91	전기안전관리대행용역 1식	(주)우림전기안전관리	ʼ24.01.09. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.09.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	전기안전관리대행 용역
	2024년 상수도시설물(4구역) 전기안전관리대행 용역	96	전기안전관리대행용역 1식	(주)태성전기안전관리	ʼ24.01.09. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.09.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	전기안전관리대행 용역
	2024년 상수도부 소관 정수장(15개소) 방역소독 용역	49	방역소독 용역 1식	벨킨스	ʼ24.01.19. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.19.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	정수장(15개소) 방역소독 용역
	2024년 중·동제주유역 상수도 지하수 기간 연장에 따른 지하수 영향조사 용역	173	지하수 영향조사 용역 1식	㈜남천개발	ʼ24.01.25. ~ ʼ24.12.19. (ʼ24.01.25.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	지하수 영향조사 용역
	2024년 서제주유역 상수도 지하수 기간 연장에 따른 지하수 영향조사 용역	125	지하수 영향조사 용역 1식	㈜웨리트제주	ʼ24.01.25. ~ ʼ24.12.19. (ʼ24.01.25.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	지하수 영향조사 용역
	2024년 서·중동서귀유역 상수도 지하수 기간 연장에 따른 지하수 영향조사 용역	157	지하수 영향조사 용역 1식	(주)덕천개발	ʼ24.01.25. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.25.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	지하수 영향조사 용역
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 건설사업관리 용역(2024년시행분)	1,686	건설사업관리용역 1식	㈜한국 종합기술	ʼ24.01.29. ~ ʼ26.06.26. (ʼ24.01.29.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설사업관리용역
	2024년 상수도시설물(1구역) 전기안전관리대행 용역	99	전기안전관리대행용역 1식	한라전기안전관리(주)	ʼ24.0129. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.29.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	전기안전관리대행 용역
	외도 산지천 생태하천복원사업 모니터링용역(3차)	47	모니터링용역 1식	㈜영아리환경기술	ʼ24.01.30. ~ ʼ24.12.30. (ʼ24.01.30.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 30조	모니터링용역(3차)
	2024년 상수도 지하수관정 이용실태조사 및 사후관리용역	139	이용실태 및 사후관리용역 1식	㈜디케이엘	ʼ24.02.01. ~ ʼ24.12.26. (ʼ24.02.01.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	사후관리용역
	농어촌생활용수 및 소규모수도시설 개량사업 실시설계 용역	169	실시설계용역 1식	(주)상아엔지니어링	ʼ24.02.21. ~ ʼ24.05.20. (ʼ24.02.21.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	실시설계 용역
	2024년 상반기 상수도 시설물 정기안전점검 용역	79	정기안전점검용역 1식	㈜부림기술	ʼ24.04.19. ~ ʼ24.06.20. (ʼ24.04.19.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	정기안전점검 용역
	취.정수장 노후 전기시설 개량공사 실시설계용역	196	실시설계용역 1식	윤엔지니어링(주)	ʼ24.04.23. ~ ʼ24.06.05. (ʼ24.04.23.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	실시설계용역
	2024년 상수도시설물 보수·보강공사 실시설계용역	39	실시설계용역 1식	㈜청풍엔지니어링	ʼ24.04.25. ~ ʼ24.06.21. (ʼ24.04.25.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조 및 30조	실시설계용역
상수도부	2024년 상수도 수질계측기 유지관리용역	220	유지괸리용역 1식	제이텍	ʼ24.05.02. ~ ʼ25.01.26. (ʼ24.05.02.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	유지관리용역
	강정정수장 현대화사업 폐기물처리용역	754	폐기물처리용역 1식	(유)중앙환경	ʼ24.06.03. ~ ʼ27.06.02. (ʼ24.06.03.)	일반용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리용역
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 폐기물처리용역	187	폐기물처리용역 1식	동남산업㈜	ʼ24.06.20. ~ ʼ26.06.26. (ʼ24.06.20.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리용역
	농어촌생활용수 급수취약지역(동부지구) 상수도시설공사 GIS DB구축용역	57	GIS DB구축 용역 1식	㈜고써베이	ʼ24.06.27. ~ ʼ25.01.22. (ʼ24.06.21.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	GIS DB구축용역
	소규모 수도시설(서부지구) 개량공사 GIS DB구축용역	68	GIS DB구축 용역 1식	㈜제이시스	ʼ24.06.21. ~ ʼ25.01.22. (ʼ24.06.21.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	GIS DB구축용역
	소규모 수도시설(동부지구) 개량공사 GIS DB구축용역	56	GIS DB구축 용역 1식	㈜제이시스	ʼ24.06.21. ~ ʼ24.12.23. (ʼ24.06.21.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	GIS DB구축용역
	농어촌생활용수 급수취약지역(동부지구) 상수도시설공사 폐기물처리 용역	37	폐기물처리용역 1식	흥남개발㈜	ʼ24.06.24. ~ ʼ24,12,20. (ʼ24.06.24.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	폐기물처리 용역
	농어촌생활용수 급수취약지역(서부지구) 상수도시설공사 폐기물처리용역	42	폐기물처리용역 1식	이도에코제주㈜	ʼ24.06.25. ~ ʼ24.12.24. (ʼ24.06.25.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	폐기물처리 용역
	2024년 유수암정수장 정밀안전진단 및 성능평가 용역	87	정밀안전진단 및 성능평가 용역 1식	(주)부성이엔씨	ʼ24.06.25. ~ ʼ24.10.22. (ʼ24.06.25.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	정밀안전진단 및 성능평가 용역
	2024년 회수정수장 정밀안전진단 및 성능평가 용역	60	정밀안전진단 및 성능평가 용역 1식	㈜바로 구조건축사사무소	ʼ24.06.25. ~ ʼ24.10.22. (ʼ24.06.25.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	정밀안전진단 및 성능평가 용역
	소규모 수도시설(동부지구) 개량공사 폐기물처리 용역	35	폐기물처리용역 1식	서귀포 산업㈜	ʼ24.06.28. ~ ʼ24.10.25. (ʼ24.06.28.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	폐기물처리 용역
	소규모 수도시설(서부지구) 개량공사 폐기물처리용역	43	폐기물처리용역 1식	정우산업개발(주)	ʼ24.06.28. ~ ʼ24.12.24. (ʼ24.06.28.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	폐기물처리 용역
	2024년 금악정수장 정밀안전진단 및 성능평가 용역	58	정밀안전진단 및 성능평가 용역 1식	㈜바로 구조건축사사무소	ʼ24.07.08. ~ ʼ24.11.04. (ʼ24.07.08.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 30조	정밀안전진단 및 성능평가 용역
	농어촌생활용수 급수취약지역(서부지구) 상수도시설공사 GIS DB구축용역	117	GIS DB구축 용역 1식	㈜일리	ʼ24.07.08. ~ ʼ25.02.02. (ʼ24.07.08.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	GIS DB구축용역
상수도부	취.정수장 노후 수배전반 교체 전기공사 감리용역	48	전기공사 감리용역 1식	㈜마루 이엔지	ʼ24.07.17. ~ ʼ25.01.12. (ʼ24.07.17.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	전기공사 감리용역
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 착공식 행사 대행 용역	24	착공식 대행 용역 1식	제주늘푸른	ʼ24.07.26. ~ ʼ24.08.14. (ʼ24.07.26.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조 및 30조	착공식 행사 대행용역
	조천정수장 정수지 외 26개소 청소용역	78	청소용역 1식	㈜청아	ʼ24.03.21. ~ ʼ24.08.17. (ʼ24.03.21.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제33조	청소용역
	2024 상수도원격검침 통합시스템 G-클라우드 서비스 임차 용역 조달	41	원격검침 통합관리시스템 클라우드 임차 1식	(주)그렉터	ʼ24.01.16. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.16.)	기술용역	조달계약	국가계약법 시행령 26조	클라우드 임차 추진
	2024년 우도면 누수탐사용역	40	누수탐사 1식	(주)에이치앤텍	ʼ24.05.14. ~ ʼ24.10.10. (ʼ24.05.14.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 26조	누수탐사 추진
	제주특별자치도 중점관리대상지역 채수 용역	79	중점관리지역 채수 1식	㈜연웅 이앤씨	ʼ24.05.22. ~ ʼ25.02.15. (ʼ24.05.22.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	중점관리지역 채수 추진
	2024년 남원대블록 유수율 제고용역	933	유수율 제고 1식	㈜한국 빅텍	ʼ24.07.10. ~ ʼ25.12.31. (ʼ24.07.10.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	유수율 제고 추진
	2024년 성산대블록 유수율 제고용역	523	유수율 제고 1식	(주)한일네트워크엔지니어링	ʼ24.07.10. ~ ʼ25.12.31. (ʼ24.07.10.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	유수율 제고 추진
	2024년 표선대블록 유수율 제고용역	549	유수율 제고 1식	(주)한일네트워크엔지니어링	ʼ24.07.10. ~ ʼ25.12.31. (ʼ24.07.10.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	유수율 제고 추진
	2024년 제주특별자치도 상수도 배수계통 유량계 교정 용역	186	유량계 교정 1식	㈜에이치에스씨 엠티	ʼ24.07.25. ~ ʼ24.12.21. (ʼ24.07.25.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	유량계 검교정 추진
하수도부	2024년 서귀포 지역(좁은골목길) 분뇨 수집‧운반 용역	31	분뇨수집운반 1식	대신위생운수사	ʼ23.02.10. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.02.10.)	일반용역	수의 2인이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	분뇨 수집운반
	지하수자원 특별관리구역 개인하수처리시설 실태조사 및 관리지원 용역(1권역)	91	개인하수처리시설 실태조사 및 관리지원 용역 1식	제주환경개발(주)	ʼ24.03.29. ~ ʼ24.08.25. (ʼ24.03.29.)	일반용역	수의 2인이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	개인하수처리시설 조사 및 관리
	지하수자원 특별관리구역 개인하수처리시설 실태조사 및 관리지원 용역(2권역)	83	개인하수처리시설 실태조사 및 관리지원 용역 1식	탐라환경산업(주)	ʼ24.03.29. ~ ʼ24.08.25. (ʼ24.03.29.)	일반용역	수의 2인이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	개인하수처리시설 조사 및 관리
하수도부	지하수자원 특별관리구역 개인하수처리시설 실태조사 및 관리지원 용역(3권역)	82	개인하수처리시설 실태조사 및 관리지원 용역 1식	㈜유민기업	ʼ24.03.29. ~ ʼ24.08.25. (ʼ24.03.29.)	일반용역	수의 2인이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	개인하수처리시설 조사 및 관리
	지하수자원 특별관리구역 개인하수처리시설 실태조사 및 관리지원 용역(4권역)	85	개인하수처리시설 실태조사 및 관리지원 용역 1식	제주환경개발(주)	ʼ24.03.29. ~ ʼ24.08.25. (ʼ24.03.29.)	일반용역	수의 2인이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	개인하수처리시설 조사 및 관리
	남원하수처리장 노후차집관로 정비사업 건설사업관리용역 24년도	80	건설사업관리 1식	㈜수성엔지니어링	ʼ23.12.16. ~ ʼ24.03.25. (ʼ23.12.16.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	성산3 하수관로 정비공사(1공구) GIS DB 구축 용역 2024년 시행분	45	GIS DB구축 1식	㈜가온도시정보	ʼ24.02.26. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.02.26.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	성산3 하수관로 정비공사(3공구) GIS DB구축 용역 23년 시행분	21	GIS DB구축 1식	주식회사 제이시스	ʼ24.06.22. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.06.22.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	성산3 하수관로 정비공사(2공구) GIS DB 구축 용역 2024년 시행분	35	GIS DB구축 1식	㈜글로베이	ʼ24.02.26. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.02.26.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	성산3 하수관로 정비공사(1공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역 2024년 시행분	67	CCTV조사 및 수밀시험 1식	㈜미래이엔씨	ʼ24.02.26. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.02.26.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	관로 내부조사
	성산3 하수관로 정비공사(2공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역 23년 시행분	37	CCTV조사 및 수밀시험 1식	㈜삼호건설	ʼ24.02.26. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.02.26.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	관로 내부조사
	성산3 하수관로 정비공사(3공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역 23년 시행분	22	CCTV조사 및 수밀시험 1식	정진건설주식회사	ʼ24.02.26. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.02.26.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	관로 내부조사
	성산하수처리구역 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2024년 시행분	380	기본 및 실시설계 1식	㈜이산	ʼ24.01.01. ~ ʼ24.06.12. (ʼ24.01.01.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수도정비 사업 시행
	성산3 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 24년 시행분	515	건설사업관리 1식	주식회사 동성엔지니어링	ʼ23.12.17. ~ ʼ24.12.31. (ʼ23.12.17.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
하수도부	서귀포시 동지역 차집관로 정비사업 건설사업관리용역	309	건설사업관리 1식	(주)수성엔지니어링 외 2개사	ʼ24.03.06. ~ ʼ24.10.18. (ʼ24.03.06.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 1공구 CCTV조사 및 수밀시험용역 24년 시행분	37	CCTV조사 및 수밀시험 1식	성빈건설(주)	ʼ23.12.11. ~ ʼ24.10.18. (ʼ24.01.17.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	관로 내부조사
	서귀포 중문관광단지 노후하수관로 정비사업 건설사업 관리용역 24년 시행분	722	건설사업관리 1식	㈜동명기술공단	ʼ24.01.03. ~ ʼ24.12.17. (ʼ24.01.17.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업 사후지하안전영향조사용역 24년 시행분	32	지하안전영향 조사 1식	㈜기반이엔씨	ʼ24.01.03. ~ ʼ24.11.17. (ʼ23.08.23.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수도 유지관리
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사 GIS DB구축용역(2차분)	42	GIS DB구축 1식	㈜아성공간정보	ʼ23.05.02. ~ ʼ24.07.31. (ʼ24.01.12.)	기술용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	GIS DB구축
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 건설사업 관리용역 24년 시행분	297	건설사업관리 1식	㈜동성엔지니어링	ʼ23.12.16. ~ ʼ24.09.10. (ʼ24.01.16.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	대정공공하수처리시설 증설사업 문화재 시굴조사	19	문화재시굴조사 1식	(재)제주고고학연구소	ʼ24.05.08. ~ ʼ24.07.06. (ʼ24.05.08.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조	문화재시굴조사
	대정하수처리구역 차집관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계	2,089	기본 및 실시설계 1식	㈜도화	ʼ24.06.04. ~ ʼ25.06.03. (ʼ24.06.04.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	공사 시행
	하모지구 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계	1,443	기본 및 실시설계 1식	㈜이산	ʼ24.06.04. ~ ʼ25.06.03. (ʼ24.06.04.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	공사 시행
	2024년 성산하수처리구역 하수관로 기술진단	69	관로조사 1식	㈜태량	ʼ24.05.28. ~ ʼ24.10.24. (ʼ24.05.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	기술진단
	2024년 보목하수처리구역 하수관로 기술진단	70	관로조사 1식	㈜태량	ʼ24.06.10. ~ ʼ24.11.06. (ʼ24.06.10.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	기술진단
	2024년 남원하수처리구역 하수관로 기술진단	139	관로조사 1식	㈜포웰	ʼ24.06.20. ~ ʼ24.12.16. (ʼ24.06.14.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	기술진단
하수도부	대정공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	215	실시설계용역 1식	주식회사 이산	ʼ24.06.04. ~ ʼ25.06.03 (ʼ24.06.04)	일반용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수도 증설사업 시행
	서부(판포)하수처리장 증설사업 건설사업관리용역 (2024년 시행분)	1,000	건설사업관리 1식	㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 2개사	ʼ24.01.01. ~ ʼ24.12.25. (ʼ24.01.30)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	제주하수처리구역 차집관로 정비사업 건설사업관리용역	2,697	건설사업관리 1식	㈜이산	ʼ24.03.07. ~ ʼ27.02.19. (ʼ24.03.07.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	제주하수처리구역(우선시행분) 차집관로 정비공사 관로내부 조사용역	25	관로내부 조사 1식	㈜마성토건	ʼ24.07.08. ~ ʼ25.07.07. (ʼ24.07.08.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 제1항제5호 마목	관로 내부조사
	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사건설사업관리용역 ʼ24년 시행분	500	건설사업관리 1식	주식회사 수성엔지니어링	ʼ23.11.20. ~ ʼ24.12.19. (ʼ23.11.20.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술 진흥법의한 건설사업관리용역시행
	24년 제주시 동·서부하수처리장, 서귀포지역내 하수슬러지 운반 및 처리용역	1,836	하수슬러지 운반 및 처리	대림종합개발(주)	ʼ24.01.11. ~ ʼ24.03.31. (ʼ24.01.11.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	시설물 유지관리
	24년 제주시 동·서부하수처리장 하수슬러지 운반 및 처리용역	2,015	하수슬러지 운반 및 처리	옥천영농조합법인	ʼ24.04.01. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.04.01.)	일반용역	입찰	지방계약법 시행령 43조	시설물 유지관리
	24년 동부하수처리장 및 중계펌프장 전기안전관리대행 용역	34	전기안전관리	㈜태성전기안전관리	ʼ24.01.11. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.11.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 12조	전기시설물 안전관리
	2024년 서부하수처리구역 제2라인 중계펌프장 전기안전관리대행 용역	27	유지관리용역 1식	(주) 아성기술단	ʼ24.01.19. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.17.)	기술용역	입찰	지방계약법 (025조 01항 05호)	시설물 유지관리
	2024년 서부하수처리구역 제1라인 중계펌프장 전기안전관리대행 용역	25	유지관리용역 1식	(주)협동전기안전관리	ʼ24.01.19. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.17.)	기술용역	입찰	지방계약법 시행령 25조5호	시설물 유지관리
	2024년 제주하수운영과 동부, 서부하수처리장 수질원격감시시스템(TMS) 유지관리 용역	60	수질원격감시 시스템(TMS) 유지관리 1식	제이텍	ʼ24.01.19. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.17.)	기술용역	수의계약 (1회 유찰)	지방계약법 시행령제26조	시설물 유지관리
	동부, 서부하수처리장 및 소규모 공공하수처리시설 수질관리 및 수처리공정 컨설팅용역(1차분)	836	수질관리 및 수처리공정 컨설팅 1식	대양엔바이오(주)	ʼ23.02.21. ~ ʼ24.02.19. (ʼ24.02.21.)	기술용역	협상에의한계약	지방계약법 시행령 제43조 1항	수질관리 및 수처리공정 컨설팅
하수도부	제주특별자치도 소규모 공공하수처리시설(14개소) 기술진단 용역	180	기술진단 1식	주식회사 정엔지니어링	ʼ24.02.15. ~ ʼ24.08.12. (ʼ24.02.15.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	하수도 유지관리
	보목하수처리장 분리막 계외세정 용역	158	분리막 계외세정 용역 1식	푸름 엔지니어링	ʼ24.01.12. ~ ʼ24.12.31.. (ʼ24.01.12.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제22조	분리막 계외세정
	23년 서귀포하수운영과 수질원격감시시스템(TMS)유지관리 용역	124	수질원격감시 시스템 유지관리 1식	제이텍	ʼ24.01.08. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.08.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령제26조	시설물 유지관리
	서귀포지역 공공하수처리시설 관리대행 시범사업	14,184	관리대행	㈜이산	ʼ24.01.01. ~ ʼ26.12.31. (ʼ23.12.28.)	기술용역	협상에의한 계약	지방계약법 시행령제43조	시설운영 관리
	2024년 서귀포 지역 내 하수처리장 하수슬러지 운반 및 처리용역	3,337	하수슬러지처리	옥천영농조합법인외 4사	ʼ24,04.01. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.04.01.)	일반용역	협상에의한 계약	지방계약법 시행령제43조	서귀포지역하수처리장 발생 하수슬러지 운반 처리
	남원하수처리장 자가용전기설비 안전관리대행 용역	22	유지관리용역 1식	㈜대경 엔지니어링	ʼ24.01.15. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.15.)	기술용역	수의계약	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준	하수처리장 및펌프장 전기안전관리
	2024년 성산공공하수처리시설 및 중계펌프장 기술진단	116	기술진단	정 엔지니어링	ʼ24.02.15. ~ ʼ24.05.14. (ʼ24.02.15.)	기술용역	일반 경쟁	지방계약법 시행령 제12조	시설물 유지관리
	2024년도 신산분뇨처리시설 기술진단	41	기술진단	㈜화인테크	ʼ24.01.26. ~ ʼ24.04.19. (ʼ24.01.26.)	기술용역	일반 경쟁	지방계약법 시행령 제12조	시설물 유지관리
현대화 추진단	2024년제주공공하수처리시설하수슬러지운반및처리용역	3,922	하수슬러지 운반 처리 1식	㈜ 동양환경 외 4개사	ʼ24.02.19. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.02.19.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제43조	제주 하수처리장 발생 하수슬러지 운반 처리
	2024년제주공공하수처리시설수질원격감시시스템(TMS)유지관리용역	32	수질원격감시 시스템(TMS) 유지관리 1식	제이텍	ʼ24.01.25. ~ ʼ24.12.31. (ʼ24.01.25.)	일반용역	수의 계약	지방계약법 시행령 제26조	수질원격 감시시스템 유지관리 1식
	제주공공하수처리시설 수질관리 및 수처리공정 컨설팅 용역	672	하수처리장 운전상태(수질분석/운전인자)분석과 최적 운전 방안 제시 등	이엔워터 (주)	ʼ24.01.16. ~ ʼ25.01.15. (24.01.16.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제26조	하수처리장 운전상태 (수질분석/운전인자)분석과 최적 운전 방안 마련
	2024년제주하수처리장시설물정기및정밀안전점검용역	22	시특법에 따른 정기 및 정밀안전점점 1식	㈜해오름 엔지니어링	ʼ24.03.16. ~ ʼ24.12.10. (ʼ24.03.16.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호	하수처리장 시설물 보수에 활용

15. 건설폐기물 처리용역 발주현황(20백만원 이상)

□ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분	연도	건 수	용역금액	비 고
총 계	2023	45	3,036
	2024	25	2,511
상수도	2023	18	783	◦폐기물처리 용역
	2024	11	1,307	◦폐기물처리 용역
하수도	2023	27	2,253	◦폐기물처리 용역
	2024	14	1,204	◦폐기물처리 용역

□ 2023년

(단위 : 백만원)

구 분	용역명	용역금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역종류	계약방법	계약근거	용역결과 활용상황
상수도부	원인자부담금(구좌농공단지) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	63	폐기물처리 1식	성진산업 (주)	ʼ23.05.08. ~ ʼ23.11.03. (ʼ23.05.08.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	원인자부담금(용담이동) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	23	폐기물처리 1식	한라환경 산업(주)	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.14. (ʼ23.05.19.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	원인자부담금(외도이동) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	35	폐기물처리 1식	서광산업 (주)	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.14. (ʼ23.05.19.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	원인자부담금(화북상업지구) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	38	폐기물처리 1식	㈜더존 환경	ʼ23.06.23. ~ ʼ24.04.17. (ʼ23.06.23.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	애월(소길블록) 노후상수도관 교체공사 폐기물처리용역	27	폐기물처리 1식	서광산업 (주)	'23.01.30. ~ '23.03.09. ('23.01.30.)	기술용역	수의계약	지방계약법 25조 1항 5호 나목	폐기물처리
	소규모 수도시설(우도지구) 상수도시설공사 폐기물처리용역	33	폐기물처리용역 1식	동남산업 (주)	'23.04.24. ~ '23.10.20. ('23.04.24.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	농어촌생활용수 급수취약지역(한경지구) 상수도 시설공사 폐기물처리 용역	70	폐기물처리용역 1식	㈜ 청봉환경	'23.04.26. ~ '23.12.21. ('23.04.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	소규모 수도시설(조천지구) 상수도시설 개량사업 폐기물처리 용역	40	폐기물처리용역 1식	㈜ 청봉환경	'23.04.26. ~ '23.12.21. ('23.04.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	소규모 수도시설(표선지구) 상수도시설 개량사업 폐기물처리 용역	44	폐기물처리용역 1식	일승산업 (주)	'23.04.26. ~ '23.10.22. ('23.04.26.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	농어촌생활용수 급수취약지역(구좌지구) 상수도시설공사 폐기물처리용역	23	폐기물처리용역 1식	제주산업 (주)	'23.04.27. ~ '23.10.23. ('23.04.27.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	소규모 수도시설(성산지구) 상수도시설 개량사업 폐기물처리 용역	57	폐기물처리용역 1식	정우산업 개발(주)	'23.04.28. ~ '23.10.24. ('23.04.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	농어촌생활용수 급수취약지역(애월지구) 상수도 시설공사 폐기물처리 용역	65	폐기물처리용역 1식	정우산업 개발(주)	'23.04.28. ~ '23.12.23. ('23.04.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	봉개2호배수지 외 2개소 배수지 철거공사 폐기물처리용역	26	폐기물처리용역 1식	이도에코 표선 (주)	'23.06.02. ~ '23.08.30. ('23.06.02.)	기술용역	수의계약	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
상수도부	토평정수장 고도정수처리시설사업 폐기물처리용역	22	폐기물처리 1식	흥남개발 (주)	ʼ23.11.14. ~ ʼ25.11.12. (ʼ23.11.14.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사 폐기물처리 용역	47	폐기물처리 1식	이도에코 제주(주)	ʼ23.05.16. ~ ʼ23.11.11. (ʼ23.05.16.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사 페기물처리용역	40	폐기물처리 1식	이도에코 제주 주)	ʼ23.07.11. ~ ʼ24.03.12. (ʼ23.07.11.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	한경면 조수(소) 판포계통 상수관망 개선사업 폐기물처리용역	80	폐기물처리 1식	제주산업 (주)	ʼ23.07.17. ~ ʼ24.01.12. (ʼ23.07.17.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	송당리 마을안길 노후상수관로 교체공사 폐기물처리용역	50	폐기물처리 1식	흥남개발 (주)	ʼ23.07.28. ~ ʼ24.04.16. (ʼ23.07.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구) 폐기물처리용역	31	폐기물처리 1식	한라환경산업㈜	ʼ23.03.20. ~ ʼ24.01.19. (ʼ23.03.20.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(2공구) 폐기물처리용역	74	폐기물처리 1식	㈜청봉환경	ʼ23.03.20. ~ ʼ24.01.19. (ʼ23.03.20.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	성산3 하수관로 정비공사(2공구,23년) 폐기물처리용역	140	폐기물처리 1식	성진 산업(주)	ʼ23.09.06. ~ ʼ24.03.05. (ʼ23.09.06.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	성산3 하수관로 정비공사(3공구,23년) 폐기물처리용역	105	폐기물처리 1식	성진 산업(주)	ʼ23.08.25. ~ ʼ24.02.24. (ʼ23.08.25.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구) 폐기물처리용역	33	폐기물처리 1식	성진산업 주식회사	ʼ23.07.14. ~ ʼ24.01.09. (ʼ23.07.14.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제22조	폐기물 처리
	서귀포 중문관광단지 노후하수관로 정비사업 건설폐기물처리용역 23년 시행분	41	폐기물처리 1식	영진기업주식회사	ʼ23.01.03. ~ ʼ23.12.31. (ʼ23.01.13.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 1공구 건설폐기물처리용역 23년 시행분	230	폐기물처리 1식	정우산업개발(주)	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10. (ʼ23.01.31.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
하수도부	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 건설폐기물처리용역 23년 시행분	90	폐기물처리 1식	흥남개발 주식회사	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10. (ʼ23.01.31.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 3공구 건설폐기물처리용역 23년 시행분	111	폐기물처리 1식	동남산업 주식회사	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.18. (ʼ23.01.31.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사 건설폐기물처리용역(2차분)	44	폐기물처리 1식	영진기업주식회사	ʼ23.05.03. ~ ʼ23.10.03. (ʼ23.05.03.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	안덕면 사계리 하수관로 정비사업 폐기물처리용역	29	폐기물처리 1식	한라환경 산업㈜	ʼ23.06.14. ~ ʼ23.11.13. (ʼ23.06.14.)	일반용역	수의 1인 견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목	폐기물 처리
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(1공구,3차분) 폐기물처리용역	35	폐기물처리 1식	흥남개발 ㈜	ʼ23.03.20. ~ ʼ23.06.17. (ʼ23.03.20.)	일반용역	수의 2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업 2단계) 1공구 건설폐기물처리용역 23년 시행분	62	폐기물처리 1식	정우산업개발㈜	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10. (ʼ23.01.19.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 건설폐기물처리용역 23년 시행분	51	폐기물처리 1식	한라환경산업㈜	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.11. (ʼ23.01.19.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구, 6차분) 폐기물처리용역	108	폐콘 1,642톤 폐아스콘 1,382톤 절삭아스콘 648톤	일승산업(주) (손승민)	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.12.15. (ʼ23.04.18.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구, 6차분) 혼합폐기물처리용역	25	혼합 68톤	한라환경산업(주) (현기숙)	ʼ23.08.29. ~ ʼ23.10.31. (ʼ23.08.29.)	기술용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	남원처리구역 하수관로 정비사업 (2단계_2공구) 건설폐기물 처리용역	80	콘크리트 709톤 아스콘 1,244톤 혼합 1톤	제주산업(주) (부공환)	ʼ23.11.03. ~ ʼ23.12.15. (ʼ23.11.03.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
	남원처리구역 하수관로 정비사업 (2단계_3공구) 건설폐기물 처리용역	75	콘크리트 849톤 아스콘 973톤 혼합 3톤	서귀포산업(주) (김상균)	ʼ23.11.03. ~ ʼ23.12.15. (ʼ23.11.03.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물처리
하수도부	도두하수처리구역 하수관로 정비사업(용담2공구) 폐기물처리용역 ʼ23년	36	폐기물처리 1식	서광산업주식회사	ʼ22.12.21. ~ ʼ23.10.16. (ʼ22.12.21.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업(용담3공구) 폐기물처리용역 23년	27	폐기물처리 1식	정우산업개발(주)	ʼ22.12.21. ~ ʼ23.10.16. (ʼ22.12.21.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	서부처리구역 하수관로정비공사(2단계-하귀2리 2공구) 폐기물처리용역(3차분)	79	폐기물처리 1식	흥남개발 주식회사	ʼ23.04.05. ~ ʼ23.11.23. (ʼ23.04.05.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	서부처리구역 하수관로정비공사(2단계-1공구) 폐기물처리용역 ʼ23년	132	폐기물처리 1식	서귀포산업 주식회사	ʼ22.08.03. ~ ʼ23.12.20. (ʼ22.08.03.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	서부처리구역 하수관로정비공사(2단계-4공구) 폐기물처리용역 ʼ23년	80	폐기물처리 1식	정우산업개발주식회사	ʼ22.04.13. ~ ʼ23.12.20. (ʼ23.04.11.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	서부처리구역 하수관로정비공사(2단계-2공구) 폐기물처리용역	192	폐기물처리 1식	서광산업 주식회사	ʼ22.09.06. ~ ʼ26.09.05. (ʼ23.09.06.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	서부하수처리구역(저지·청수~판포간) 차집관로정비공사 폐기물처리용역	289	폐기물처리 1식	정우산업개발주식회사	ʼ22.09.06. ~ ʼ26.03.05. (ʼ23.09.06.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	한림 비양도 소규모 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	19	폐기물처리 1식	이도에코 제주(주)	ʼ23.03.13. ~ ʼ23.03.13. (ʼ23.03.13.)	일반용역	수의1인견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 8호 사목	폐기물 처리
	연동.노형2이호처리분구노후하수관로정비공사연동1공구폐기물절삭아스콘처리용역 ʼ23년 과업지시분	35	폐기물처리 1식	이도에코제주㈜	ʼ23.06.29. ~ ʼ24.02.26. (ʼ23.06.29.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리

□ 2024년

(단위 : 백만원)

구 분	용역명	용역금액	용역내용	용역기관	용역기간 (계약일)	용역종류	계약방법	계약근거	용역결과 활용상황 (계획)
상수도부	원인자부담금(화북상업지구) 배수지 시설공사 건설폐기물처리용역	60	폐기물처리 1식	㈜더존 환경	ʼ24.06.05. ~ ʼ25.06.04. (ʼ24.06.05.)	일반용역	수의 2인 이상견적	지방계약법 시행령 제30조	폐기물처리
	하효지구 상수관로 정비 공사 폐기물처리용역	29	폐기물처리 1식	한라환경 산업(주)	ʼ24.06.19. ~ ʼ24.10.16. (ʼ24.06.19.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	폐기물처리
	서홍지구 상수관로 정비 공사 폐기물처리용역	35	폐기물처리 1식	한라환경산업 (주)	ʼ24.06.19. ~ ʼ24.12.15. (ʼ24.06.19.)	일반용역	수의계약	지방계약법 시행령 25조	폐기물처리
	동홍지구 상수관로 정비 공사 폐기물처리용역	60	폐기물처리 1식	동남산업 (주)	ʼ24.06.25. ~ ʼ25.02.19. (ʼ24.06.25.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	원인자부담금(하귀1리) 상수도 시설공사 건설폐기물처리용역	25	폐기물처리 1식	㈜청봉환경	ʼ24.08.26. ~ ʼ25.02.21. (ʼ24.08.26.)	일반 용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	사업시행
	강정정수장 현대화사업 폐기물 처리용역	754	폐기물처리용역 1식	(유)중앙 환경	'24.06.03. ~ '27.06.02. ('24.06.03.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	급수취약지역(동부지구) 상수도 시설공사 건설폐기물 처리용역	37	폐기물처리용역 1식	흥남개발(주)	'24.06.24. ~ '24.12.20. ('24.06.24.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 폐기물 처리용역	187	폐기물처리용역 1식	동남산업(주)	'24.06.27. ~ '26.06.26. ('24.06.27.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	급수취약지역(서부지구) 상수도 시설공사 건설폐기물 처리용역	42	폐기물처리용역 1식	이도에코제주(주)	'24.06.28. ~ '24.12.24. ('24.06.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	소규모 수도시설(동부지구) 개량공사 건설폐기물 처리용역	35	폐기물처리용역 1식	서귀포산업(주)	'24.06.28. ~ '24.10.25. ('24.06.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
	소규모 수도시설(서부지구) 개량공사 건설폐기물 처리용역	43	폐기물처리용역 1식	정우산업개발 (주)	'24.06.28. ~ '24.12.24. ('24.06.28.)	기술용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 12조	폐기물처리
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(2공구, 2024) 폐기물처리용역	30	폐기물처리 1식	한라환경산업㈜	ʼ24.03.06. ~ ʼ24.12.30. (ʼ24.03.06.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	성산3 하수관로 정비공사(1공구) 폐기물처리용역	245	폐기물처리 1식	흥남개발주식회사	ʼ24.04.11. ~ ʼ26.03.31. (ʼ24.04.11.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	서귀포 중문관광단지 노후하수관로 정비사업 건설폐기물처리용역 24년 시행분	38	폐기물처리 1식	영진기업주식회사	ʼ23.01.03. ~ 24.11.17. (ʼ23.01.03.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
하수도부	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사 건설폐기물처리용역(2차분)	44	폐기물처리 1식	영진기업주식회사	ʼ23.05.03. ~ 24.07.31. (ʼ23.05.03.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 1공구 건설폐기물처리용역 24년 시행분	99	폐기물처리 1식	정우산업개발㈜	ʼ24.05.01. ~ ʼ24.08.10. (ʼ24.05.08.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	대평 간이오수처리 시설 철거공사 폐물처리용역	23	폐기물처리 1식	성진 산업㈜	ʼ24.07.29. ~ ʼ24.10.26. (ʼ24.07.29.)	일반용역	수의 1인 견적	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목	폐기물 처리
	서부(판포)공공하수 처리시설 증설사업 건설폐기물처리용역 (2024년도 시행분)	30	폐기물처리 1식	영진기업 주식회사	ʼ24.01.31. ~ ʼ24.11.26. (ʼ24.01.31.)	일반용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	월정 공공하수처리시설 증설사업 건설폐기물 처리용역	28	폐기물처리 1식	제주산업 주식회사	ʼ23.11.10. ~ ʼ25.07.09. (ʼ23.11.10.)	기술용역	일반경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	연동.노형2(이호처리분구)노후하수관로정비공사(연동1공구) 폐기물처리용역 ʼ24년 과업지시분	185	폐기물처리 1식	정우산업	ʼ24.01.02. ~ ʼ24.02.26. (ʼ24.01.02.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	연동.노형2(이호처리분구)노후하수관로정비공사(연동2공구) 폐기물처리용역 ʼ24년 과업지시분	174	폐기물처리 1식	서귀포산업(주)	ʼ23.12.24. ~ ʼ24.12.31. (ʼ23.12.24.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	연동.노형2(이호처리분구)노후하수관로정비공사(연동1공구)폐기물절삭아스콘처리용역 ʼ24년 과업지시분	79	폐기물절삭처리 1식	이도에코제주(주)	ʼ23.12.24. ~ ʼ24.12.06. (ʼ23.12.24.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	연동.노형2(이호처리분구)노후하수관로정비공사(연동2공구)폐기물절삭아스콘처리용역 ʼ24년 과업지시분	114	폐기물절삭처리 1식	제주산업 (주)	ʼ23.12.24. ~ ʼ24.12.26. (ʼ23.12.24.)	일반용역	제한경쟁	지방계약법 시행령 제12조	폐기물 처리
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업(용담2공구) 폐기물처리용역 ʼ24년 시행분	36	폐기물처리 1식	서광산업주식회사	ʼ22.12.21. ~ʼ23.07.16. (ʼ22.12.21.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업(용담3공구) 폐기물처리용역 24년 시행분	79	폐기물처리 1식	정우산업개발(주)	ʼ22.12.21. ~ʼ24.03.12. (ʼ22.12.21.)	일반용역	수의2인이상견적	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호	폐기물 처리

16. 지방재정 투자 심사 현황

(단위 : 백만원)

부서명	사 업 명	사업개요	사업 기간	사업비	투자심사
					일자	결과
하수도부	1건			15,000
	공공하수처리시설 민간관리대행 시범사업	공공하수처리시설 민간 관리대행 : 2개소	2024. ~ 2026.	15,000	'23.8.10.	중기지방재정 계획반영(조건부)

17. 감사원, 감사위원회 감사 지적사항 및 처리결과

□ 2022년 감사원 감사

제 목	처분요구 등 내용	조치일자	처리결과	완결여부
공유재산 실태조사 등 재산과리 업무 부적정	공유재산 이용현황 등에 대한 실태조사 매년 년1회 이상 미실시	2022.5.10.	매년 1회 이상 공유재산 이용 현황 등 실태조사 실시	완결
수도요금 감면제도 운영 미흡	기초생활수급자에 대한 수도조례감면규정 재·개정, 기초생활수급자에 대한 복지사각 해소 방안 마련	2022.12.30.	기초생활 수급자에 대한 수도조례 감면규정 개정('22.12.30.) - 기초생활수급자 복지사각 해소를 위한 수도요금 감면 추진 : '23. 1월 ~	완결

18. 2024년 회계연도 예산의 이용․전용사항 및 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

18-1. 2024년 회계연도 예산의 이용․전용사항

□ 상수도

(단위 : 천원)

예산과목				승인 일자	예산액	지출액	예산 잔액	향후 소요액	요구액		사유
정책	단위	세부	과목						증	감
				“해	당	사	항	없	음”

□ 하수도

(단위 : 천원)

예산과목				승인 일자	예산액	지출액 (원인행위)	예산 잔액	향후 소요액	요구액		사유
정책	단위	세부	목 (세목)						증	감
도민이 만족하는고품질 물관리 (자본)	공공 하수도설치 (제주)	동부서부 하수처리장 증설사업 어업피해 조사용역 보상용역	공기관 등에 대한 위탁사업비	`24.7.29.	2,000,000	690,000	1,320,000	-	-	1,320,000	서귀포지역 어업피해보상 사업비 부족으로 보상금 지급이 어려워 제주시지역 어업피해보상 사업비를 전용하여 보상금 조속 지급하여 피해 어업인들과 상생방안을 마련
	하수 처리 시설 관리 (서귀포)	보목하수 처리장 시설운영 관리	공기관 등에 대한 위탁사업비		2,380,000	2,380,000	-	1,320,000	1,320,000	-

18-2. 계속비, 명시이월, 사고이월 추진상황

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	계속비	명시이월	사고이월
합 계	건	75	28	11	36
	금액	66,152.3	50,139	2,995	13,018.3
수도사업 특별회계	건	30	7	8	15
	금액	26,854	16,966	2,433	7,455
하수도사업 특별회계	건수	45	21	3	21
	금액	39,298.3	33,173	562	5,563.3

□ 계속비

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	총 사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행잔액	추진상황 (진도율)
합 계		832,156	28건	50,139	25,549	24,587
수도사업 특별회계	소 계	200,353	7건	16,966	6,478	10,488
	조천정수장 고도 정수처리시설사업	51,091	-고도정수처리시설 (37,000톤/일)	1,353	406	947	추진중 (20%)
	토평정수장 고도 정수처리시설사업	26,790	-고도정수처리시설 (12,400톤/일)	411	129	282	추진중 (35%)
	추자정수장 해수담수화 시설 개량 및 증설사업	26,996	- 해수담수화 개량(1,500㎥/일) 및 증설(1,500㎥/일)	8,716	5,308	3,408	추진중 ('24.06.27.착공)
	가파정수장 해수 담수화 시설 개량 및 증설사업	10,000	- 해수담수화 개량(300㎥/일) 및 증설(300㎥/일)	426	0	426	실시설계 추진중
	마라정수장 해수 담수화 시설 개량 및 증설사업	8,500	- 해수담수화 개량(1,00㎥/일) 및 증설(200㎥/일)	342	0	342	실시설계 추진중
	강정정수장 현대화사업	52,026	-정수장 현대화 (25,000㎥/일)	4,877	497	4,380	추진중 (15%)
	노후 상수관로 정비사업(애월읍)	24,950	관망정비55.76km	841	138	703	추진중 (10%)
하수도 공기업 특별회계	소 계	631,803	21건	33,173	19,071	14,099
	중문관광단지 하수관로 정비	32,296	-하수관로 3.6㎞ -중계펌프장 신설 1개소	3,145	2,658	486	추진중 (90%)
	예래대륜(2단계) 하수관로 정비	32,730	-하수관로 14.9㎞ -배수설비 1,831개소	5,435	3,080	2,355	추진중 (92%)
	서홍동홍(2단계) 하수관로 정비	19,430	-하수관로 0.8㎞ -배수설비 667개소	264	242	22	추진중 (93%)
	서귀포 보목토평 하수관로 정비사업	33,424	-오수관로 22.4㎞ -배수설비 989개소	1,005	1,000	5	완료
	서귀포 동지역 차집관로 정비	43,707	-차집관로 35.7㎞ -월류수처리시설 1식	167	142	25	추진중 (33%)
	남원하수처리구역 하수관로 정비사업(2단계)	37,901	-오수관로 22.1㎞ -배수설비 977개소	1,570	1,133	437	추진중 (26%)
	남원하수처리장 노후차집관로정비	20,208	-차집관로 14.9㎞ -중계펌프장 개량 9개소	527	302	225	추진중 (22%)
	서귀포 성산3 하수관로 정비사업	27,852	-하수관로 3.3㎞ -중계펌프장 신설 1개소	1,250	738	512	추진중 (72%)
	동부(월정)하수 처리장 증설사업	53,779	-증설 12천㎥/일 -오수관로 15.1㎞	4,534	3,942	592	추진중 (40%)
	서부(판포)하수 처리장 증설사업	48,377	-증설 20천㎥/일	2,176	1,111	1,065	추진중 (74%)
	도두(이호처리분구) 노후 하수관로 정비	32,620	-하수관로 13.8㎞ -배수설비 2,080개소	963	420	543	추진중 (80%)
	도두하수처리구역 하수관로 정비	14,180	-하수관로 3.8㎞ -배수설비 2,080개소	8	5	3	추진중 (99%)
	오라·아라 하수관로 정비	41,512	-하수관로 27.8㎞ -배수설비 1,988개소	980	564	416	추진중 (67%)
	서부처리구역 하수관로 정비(2단계)	43,470	-오수관로 25.3㎞ -배수설비 960개소	1,245	861	384	추진중 (13%)
	조천처리분구 하수관로 정비	32,070	-하수관로 22.9㎞ -배수설비 1,825개소	1,017	490	527	추진중 (45%)
	서부하수처리구역 차집관로 정비	44,886	-차집관로 34.3㎞ -중계펌프장 개량 22개소	625	-	625	행정절차중
	제주하수처리구역 차집관로 정비	29,493	-차집관로 22.1㎞ -중계펌프장 개량 2개소	1,119	382	737	행정절차중
	추자면 농어촌마을 하수도 정비	10,000	-하수관로 5.5㎞ -소규모처리시설 2개소	4,086	112	3,973	실시설계중
	제주시 농어촌마을 하수도 정비 (우도 비양동)	18,489	-하수관로 5.3㎞ -소규모처리시설 450㎥/일	2,093	1,354	738	완료
	제주시 농어촌마을 하수도 정비 (우도 천진리)	7,493	-하수관로 8.8㎞	818	535	283	완료
	소규모 공공하수처리 시설 스마트 통합원격 관리체계구축 시범사업	7,886	-소규모처리시설 13개소 -간이펌프장 54개소	146	-	146	추진중 (15%)

□ 명시이월(건설개량이월)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	총 사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행 잔액	추진상황 (진도율)
합 계		29,164	11건	2,995	958	2,037
수도사업 특별회계	소 계	25,371	8건	2,433	534	1,899
	애월정수장 고도정수처리시설설치사업	4,304	-고도정수처리시설(23,000㎥/일)	10	10	0	완료
	식수전용저수지 확충사업	3,546	-저수지 보강 및 확장 1식	140	140	0	완료
	노후정수장(별도봉) 개량사업	3,509	-노후정수장(별도봉) 개량 및 현대화	878	0	878	추진중 (80%)
	정수장 위생관리 개선사업	759	-완속여과지 개량 등 위생관리 개선 1식	155	152	3	완료
	온실가스 감축설비 지원사업	1,053	-펌프시설 개량 1식	209	0	209	완료
	지능형 수처리 운영센터 종합컨트롤타워 구축사업	1,300	-종합 컨트롤타워 및 거점정수장(5개소) 구축 1식	7	7	0	완료
	블록구축지역 시설개선사업	8,200	-유수율 유지를 위한 5개 대블록 누수탐사ㆍ복구 등 관로 정비	375	219	156	추진중 (50%)
	블록구축지역 유수율유지관리	2,700	-블록구축지역 누수탐사, 유수율 유지관리	659	6	653	추진중 (50%)
하수도 공기업 특별회계	소 계	3,793	3건	562	424	138
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비	2,813	-하수관로 4.4㎞ -펌프장 신설·개량 4개소	175	140	35	공사중 (80%)
	서귀포지역 소규모 하수관로 정비사업	700	-대평 소규모처리시설 철거 1식	127	45	82	추진중 (35%)
	서부하수처리장 반응조 1지 산기관 교체공사	280	-서부하수처리장 반응조 1지 산기관 교체	260	239	21	완료

□ 사고이월

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	총 사업비	사업내용	이월액	이월액 집행금액	집행 잔액	추진상황 (진도율)
	합 계	75,978	36건	13,018.3	8,510.3	3,941
수도사업 특별회계	소 계	39,393	15건	7,455	3,946	3,509
	2023회계연도 상수도공기업특별회계 결산 회계감사 용역수수료	22	-회계감사 용역 1식	18	18	-	완료
	친환경 대체취수원 개발사업	5,876	-취수원 개발 및 송수관 정비 1식	914	821	93	추진중 (90%)
	식수전용 저수지확충사업	3,546	-저수지 보강 및 확장 1식	600	354	246	추진중 (80%)
	원인자부담금 상수도시설사업	4,657	-상수도 시설확충사업 1식	1,181	47	1,134	추진중 (60%)
	상수원보호구역 변경(해제)사업	50	-상수원보호구역 해제 1식	13	0	13	추진중 (50%)
	노후정수장(별도봉) 개량사업	3,510	-노후정수장(별도봉) 개량 및 현대화	154	120	34	추진중 (80%)
	한림정수장 고도정수 처리시설증설사업	86	-고도정수처리시설 2,00톤/일 증설, 배출수처리시설 6,000톤/일 신설	64	0	64	완료
	지능형 수처리 운영센터 종합컨트롤타워 구축	3,277	-종합 컨트롤타워 및 거점정수장(5개소) 구축 1식	16	16	0	완료
	정수장 위생관리 개선사업	759	-완속여과지 개량 등 위생관리 개선 1식	145	134	11	완료
	취.정수장 노후 수배전반 및 계정제어반 교체공사	3,200	-노후 특고압 수배전반 및 관정제어반 교체 1식	598	593	5	완료
	취정수장 안전 및 유지관리 용역	835	-수질계측기 유지관리용역 1식	78	78	0	완료
	블록구축지역 시설개선사업	10,191	-유수율 유지를 위한 5개 대블록 누수탐사ㆍ복구 등 관로 정비	2,542	1,412	1,130	추진중 (50%)
	블록구축지역 유수율유지관리	2,700	-블록구축지역 누수탐사, 유수율 유지관리	817	113	704	추진중 (80%)
	효율적 유수율 향상방안연구용역	250	-유수율 향상방안 연구용역 1식	75	0	75	추진중 (80%)
	유량계 검·교정 용역 중점관리대상지역수질검사	434	-유량계 검·교정 1식 및 상수도 중점관리대상지역 채수 용역 및 수질검사	240	240	0	완료
하수도 공기업 특별회계	소 계	36,585	21건	5,563.3	4,564.3	432
	2023회계연도 하수도공기업특별회계 결산 회계감사 용역수수료	21	-회계감사 용역 1식	19	19	-	완료 (100%)
	2023년 서귀포지역 (좁은골목길 등) 분뇨 수집‧운반용역	48	-분뇨‧수집운반 용역 1식	5	5	-	완료
하수도 공기업 특별회계	소규모하수처리장 수질관리 및 수처리 컨설팅 용역	436	-수질관리 및 수처리 컨설팅 1식	9	9	-	완료
	수질관리 및 수처리 컨설팅 용역(서부)	200	-수질관리 및 수처리 컨설팅 1식	200	200	-	완료
	보목하수처리장 카트리지형 분리막 제작 구입	473	-카트리지형 분리막 400개 교체	144	144	-	완료
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비	2,813	-하수관로 4.4㎞ -펌프장 신설·개량 4개소	92	92	-	공사중 (80%)
	서귀포지역 소규모 하수관로 정비사업	700	-대정읍 하모리 소규모 하수관로 정비 1식	55	55	-	완료
	보목하수처리장 증설에 따른 보목마을주민 지원사업	9,000	-주택임대사업 1식	0.3	0.3	-	추진중 (90%)
	남원하수처리장 증설사업에 따른 태흥3리 주민지원사업	3,030	-다가구(임대)주택 신축 -다목적회관 신축	248	248	-	임대주택 완료('23.9.), 다목적회관 추진중 (70%)
	하모1리마을회 하모리 마을살라기 주택임대사업	2,550	-주택임대사업 1식	138	138	-	추진중 (99%)
	하귀2리 하수관로 정비공사	6,097	-하수관로 2.674km -배수설비 559가구	256	203	53	완료
	우도면 조일리 비양동 새마을 마을발전사업	1,845	-농수산 지역특산물 저장·판매시설 지원	566	-	-	추진중 (70%)
	월령리 새마을회 다가구주택 신축공사	2,014	-다가구주택 신축 1식	474	474	-	추진중 (99%)
	판포어촌계 작업장 및 공동 농수산물 판매 신축사업	1,350	-공동작업장 신축 1식	717	338	378	추진중 (99%)
	마을 문화복지공간 조성공사(김녕리)	1,800	-김녕리 마을문화복합센터 건물 신축(3층) 지원	632	632	-	추진중 (95%)
	김녕 해양문화복지센터 건립사업	1,450	-김녕해양문화복지센터 신축(2층) 지원	552	552	-	완료
	소규모하수처리시설 노후 시설 정비공사	330	-추자영흥리 소규모하수처리시설 안전난간 보수 1식	15	15	-	완료
하수도 공기업 특별회계	위생처리장(제주,동부,서부) 노후시설물 정비	303	-제주위생처리장 지붕 보수	10	10	-	완료
	서부하수처리계통 간이펌프장 분전반 조달구입	100	-간이펌프장 분전반 조달 구입 1식	98	97	1	완료
	슬러지 처리비	1,893	-제주하수처리장 발생 슬러지 운반 및 처리 용역 1식	1,267	1,267	-	완료
	제주공공하수처리시설 주변지역 지원사업 계획수립 용역	132	-제주공공하수처리시설 주변지역 지원사업 계획 수립 -공공하수처리시설 주변지역 주민지원사업 지원기준(안) 마련	66	66	-	완료

19. 2024년 예산집행 현황 (‘24. 8. 31.기준)

□ 상수도 공기업

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	집 행 액	잔 액	주요집행내역
합 계	256,444	148,573	107,871
필수경비	63,739	38,539	25,200	◦인건비: 10,841 ◦동력비: 18,583 ◦채무상환: 9,115
경상사업	19,613	7,944	11,669	◦사무관리비: 612 ◦업무추진비: 44 ◦행사운영비: 16 ◦기타보상금: 11 ◦전기손익수정손실: 23 ◦약품비: 60	◦공공운영비: 1,543 ◦재료비: 506 ◦민간이전 등: 130 ◦여비: 122 ◦수선유지비: 1,997 ◦기타: 2,880
투자사업	171,592	102,090	69,502	◦상수도 분야 시설사업: 101,591 ◦자산및물품취득비: 499
예 비 비	1,500	-	1,500

□ 하수도 공기업

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	집 행 액	잔 액	주요집행내역
합 계	372,631	219,304	153,327
필수경비	63,982	37,245	26,737	◦인건비: 7,833 ◦동력비: 10,483 ◦채무상환: 14,630 ◦연금부담금 등: 2,319 ◦징수수수료(내부거래): 1,980
경상사업	33,513	21,120	12,393	◦사무관리비: 1,955 ◦업무추진비: 42 ◦연구용역비: 74 ◦기타보상금: 9 ◦전기손익수정손실 : 47 ◦배상금등: 6	◦공공운영비: 1,012 ◦재료비: 2,272 ◦민간이전 등: 15,575 ◦여비: 125 ◦국고반환금: 3
투자사업	273,769	160,048	113,721	◦하수관로 정비·증설 등 사업비: 77,295 ◦자산및물품취득비: 369 ◦민간이전 등: 3,733 ◦공기관대행사업비: 60,817 ◦BTL임대료: 17,834
예 비 비	1,367	891	476	◦예비비

20. 2025년 국비 신청 현황

□ 총  괄

(단위 : 건, 백만원)

사업명	신청액		반영액		비고
	건수	금액	건수	금액
합 계	50	192,086	44	179,576
노후 상수도 정비	10	28,306	7	27,195
도서지역식수원개발	4	12,542	4	11,855
도시침수 대응	2	1,862	2	3,018
하수관로 정비	21	69,211	19	60,459
하수처리장 증설	4	54,914	4	52,302
하수관로정비BTL 임대료	7	22,847	7	22,847
농어촌마을하수도 정비	1	504	-	-
소규모 하수처리시설 통합원격관리체계 구축	1	1,900	1	1,900

□ 2025년 국비 신청 및 반영 현황

(단위 : 백만원)

순번	사업명	사업량	사업위치	부처명	신청액	반영액	비고
	합 계				192,086	179,576
1	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설	해수담수화시설 1,500톤/일 증설	추자정수장	환경부	4,897	4,897	계속
2	가파담수장 해수담수화시설 개량 및 증설	해수담수화시설 300톤/일 증설	가파담수장	환경부	1,750	1,575	계속
3	마라담수장 해수담수화시설 개량 및 증설	해수담수화시설 200톤/일 증설	마라담수장	환경부	2,695	2,183	계속
4	비양도 해저관로 확충사업	비양도 해저관로 확충 (D100mm) L=1.6km(2개열)	제주시 한림읍(비양도) 일원	환경부	3,200	3,200	계속
5	애월읍노후상수관망정비	노후상수관로 55.76㎞정비	읍면지역(애월)	환경부	8,182	7,343	계속
6	강정정수장현대화사업	고도처리시설 25,000톤/일	강정정수장	환경부	212	712	계속
7	구좌.성산노후상수관망정비	노후상수관로 101㎞정비	읍면지역(구좌,성산)	환경부	3,455	9,955	계속
8	제주시 영평중블록 노후상수관망 정비사업	구좌읍,성산읍 관망정비 89.55㎞	제주시 동지역 일원(일도동, 이도동, 도남동 등)	환경부	2,433	2,434	신규
9	서귀포시 동홍·삼매봉중블록 노후상수관망 정비사업	배급수관 71.2㎞ 정비	서귀포시 동지역 일원(동홍동, 송산동 등)	환경부	2,479	2,480	신규
10	제주시 사라·별도봉중블록 노후상수관망 정비사업	배급수관 70.9㎞ 정비	제주시 동지역 일원(건입동, 일도동 등)	환경부	2,193	2,193	신규
11	서귀포시 남원대블록 노후상수관망 정비사업	배급수관 57.9㎞ 정비	서귀포시 남원읍 일원	환경부	2,078	2,078	신규
12	서귀포시 표선대블록 노후상수관망 정비사업	관망정비 60.2km	서귀포시 표선면 일원	환경부	1,789	-	신규
13	노후정수장(오라정수장) 정비사업	노후정수장 개량 15,000㎥/일	제주시 오라2동 (오라정수장)일원	환경부	2,421	-	신규
14	노후정수장(어승생정수장) 정비사업	노후정수장 개량 15,000㎥/일	제주시 해안동 (어승생정수장) 일원	환경부	3,064	-	신규
15	화북지구 도시침수 대응사업	하수관로 정비 L=8.2㎞	제주시 화북동 일원	환경부	600	500	신규
16	제주하수처리구역 차집관로 정비사업 (2단계)	차집관로 정비 L=22.0㎞	제주시 동지역 일원	환경부	907	-	신규
17	제주시 동지역 하수관로 정비사업	하수관거 정비 L=22.8km	제주시 동지역 일원	환경부	805	500	신규
18	동부하수처리구역 하수관로 정비사업	하수관거 정비 L=37.5km	조천읍, 구좌읍 일원	환경부	1,029	-	신규
19	서부하수처리구역 하수관로 정비사업	하수관거 정비 L=31.5km	애월읍, 한림읍, 한경면 일원	환경부	1,180	-	신규
20	보목하수처리구역 하수관로 정비사업	하수관거 정비 L=36.7km	서홍동, 동홍동, 효돈동, 상효동 일원	환경부	1,150	500	신규
21	대정 하모 도시침수 대응사업	하수관로 정비 L=7.9㎞	대정읍 일원	환경부	1,262	2,518	계속
22	대정하수처리구역 차집관로 정비사업 (2단계)	차집관로 정비 L=40.0㎞	대정읍 일원	환경부	2,530	2,756	계속
23	남원하수처리구역 하수관로 정비사업 (2단계)	하수관로 정비 L=23.5㎞	남원읍, 표선면 일원	환경부	5,258	6,129	계속
24	남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업	차집관로 정비 L=15.4㎞	남원읍, 표선면 일원	환경부	1,810	2,714	계속
25	서귀포시 동지역 차집관로 정비사업	차집관로 정비 L=35.7㎞	서귀포시 일원	환경부	3,909	8,447	계속
26	성산3 하수관로 정비사업	하수관로 정비 L=29.6㎞	성산읍 일원	환경부	4,033	1,597	계속
27	성산하수치리구역 차집관로 정비사업	차집관로 정비 L=22.0㎞	성산읍 일원	환경부	4,249	8,055	계속
28	대정하수처리구역 차집관로 정비사업	차집관로 정비 L=11.8㎞	대정읍·안덕면 일원	환경부	1,215	1,202	계속
29	서귀포 보목토평 하수관로 정비사업	차집관로 정비 L=26.3㎞	보목동, 토평동, 상효동, 신효동 일원	환경부	3,155	-	계속
30	서부처리구역 하수관로 정비사업 (2단계)	하수관로 정비 L=28.6㎞	한림읍, 애월읍, 현경면 일원	환경부	2,724	2,697	계속
31	제주(도두)하수처리구역 하수관로 정비사업	하수관로 정비 L=7.9km	시민복지타운~ 용담펌프장, 노형오거리~ 도두중계펌프장	환경부	5,830	-	계속
32	오라·아라 하수관로 정비사업	하수관로 정비 L=29.4㎞	오라동, 아라동 일원	환경부	5,508	1,671	계속
33	조천처리분구 하수관로 정비사업	하수관로 정비 L=24.9㎞	조천읍 일원	환경부	3,063	3,179	계속
34	제주하수처리구역 차집관로 정비사업	차집관로 정비 L=22.1㎞	제주시 일원	환경부	2,449	3,102	계속
35	서부하수처리구역 차집관로 정비사업	차집관로 정비 L=34.3㎞	애월읍, 한경면 일원	환경부	4,301	4,800	계속
36	동부하수처리구역 차집관로 정비사업	차집관로 정비 L=36.5㎞	중문관광단지 일원	환경부	11,906	10,286	계속
37	제주시 탑동로 배수암거 정비사업	배수암거 정비 L=0.3㎞	동홍동 일원	환경부	2,200	2,824	계속
38	제주하수처리장 현대화사업	220천톤/일	제주하수처리장	환경부	47,000	47,000	계속
39	대정하수처리장 증설사업	증설 13천톤/일	대정하수처리장	환경부	2,490	1,378	계속
40	동부하수처리장 증설사업	증설 12천톤/일	동부하수처리장	환경부	3,924	2,424	계속
41	서부하수처리장 증설사업	증설 20천톤/일	서부하수처리장	환경부	1,500	1,500	계속
42	10 제주시 읍면지역 BTL 시설임대료	시설임대료	애월읍, 한경면 일원	환경부	2,224	2,224	계속
43	09 제주시 읍면지역 BTL 시설임대료	시설임대료	애월읍, 조천읍, 한경면 일원	환경부	2,713	2,713	계속
44	08 제주시 동지역 BTL 시설임대료	시설임대료	일도1·2동, 이도2동, 건입동 일원	환경부	2,598	2,598	계속
45	08 제주시 읍면지역 BTL 시설임대료	시설임대료	한림읍, 애월읍, 구좌읍, 일원	환경부	5,453	5,453	계속
46	06 제주시 동지역 BTL 시설임대료	시설임대료	일도1, 이도1, 삼도1·2, 건입동 일원	환경부	1,811	1,811	계속
47	06 제주시 읍면지역 BTL 시설임대료	시설임대료	한림읍, 애월읍, 구좌읍, 일원	환경부	3,034	3,034	계속
48	06 서귀포시 읍면지역 BTL 시설임대료	시설임대료	남원읍, 표선면 일원	환경부	5,014	5,014	계속
49	영흥신양리 농어촌마을 하수도 개량사업	개량 1식	추자면 일원	환경부	504	-	계속
50	소규모 하수처리시설 통합원격관리체계 구축사업	통합원격시스템 구축 1식	제주도 부속섬 일원	환경부	1,900	1,900	계속

21. 각종 공사 및 물품구입 현황(공사 1억, 물품 2천만원 이상)

□ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분	연도	건 수	사업비	비 고
총 계	2023	277	180,368	◦완 료 261건 ◦추진중 15건 ◦일시중지 1건
	2024	139	92,064	◦완 료 59건 ◦추진중 78건 ◦일시중지 2건
상수도부	2023	97	94,524	◦완 료 92건 ◦추진중 5건
	2024	48	35,255	◦완 료 13건 ◦추진중 35건
하수도부	2023	166	83,789	◦완 료 155건 ◦추진중 10건 ◦일시중지 1건
	2024	83	55,398	◦완 료 42건 ◦추진중 39건 ◦일시중지 2건
현대화 추진단	2023	14	2,055	◦완 료 14건 ◦추진중 -건
	2024	8	1,411	◦완 료 4건 ◦추진중 4건

□ 2023년

(단위 : 백만원)

구 분	공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약 상대자	계약 방법	추진상황
상수도부	애월정수장 고도정수처리시설사업	고도정수처리시설 (Q=23,000톤/일) 1식	ʼ22.01.06. ~ ʼ23.12.19.	5,871	신한종합 건설(주)	제한 경쟁	완료
	2023년 상반기 수질검사 시약, 초자류 구매	시약, 초자류 187종 구매	ʼ23.03.20. ~ ʼ23.04.18	174	탐라랩테크	제한 경쟁	완료
	교래지구 취수원(1호공) 취수원 개발사업	취수원(1,000㎥/일) 개발 1식	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.10.17.	564	㈜규성	제한 경쟁	완료
	교래지구 취수원(2호공) 취수원 개발사업	취수원(1,000㎥/일) 개발 1식	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.10.17.	564	㈜규성	제한 경쟁	완료
	교래지구 취수원(3호공) 취수원 개발사업	취수원(1,000㎥/일) 개발 1식	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.10.17.	555	유성삼정 개발(주)	제한 경쟁	완료
	교래지구 취수원(4호공) 취수원 개발사업	취수원(1,000㎥/일) 개발 1식	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.10.17.	550	㈜워터제주	제한 경쟁	완료
	원인자부담금(구좌농공단지) 상수도 시설사업	상수도 신설 D100mm L=1.8km	ʼ23.04.06. ~ ʼ23.10.06.	487	태정토건(주)	제한 경쟁	완료
	교래지구(1~4호공) 취수원개발사업 관급자재(SUS파이프) 조달구입	SUS파이프 281본 구입	ʼ23.05.01. ~ ʼ23.07.27.	322	㈜신대한 관리	조달 계약	완료
	애월정수장 고도정수처리시설사업 관급자재(펌프) 구입	원수(6대), 막여과(6대) 펌프 구입	ʼ23.05.10. ~ ʼ23.08.07.	175	(주) 대아펌프	제한 경쟁	완료
	원인자부담금(외도이동) 상수도 시설사업	상수도 신설 D150mm L=1.0km	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.14.	383	기흥건설(주)	제한 경쟁	완료
	원인자부담금(용담이동) 상수도 시설사업	상수도 신설 D100mm L=0.7km	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.14.	258	제주개발(주)	제한 경쟁	완료
	애월정수장 고도정수처리시설사업 관급자재(스트레이너) 구입	스트레이너(250A) 6대 구입	ʼ23.05.23. ~ ʼ23.08.20.	55	(주)현대밸브	수의 계약	완료
	하례지구 대체취수원 개발사업	취수원(1,300㎥/일) 개발 1식	ʼ23.05.24. ~ ʼ23.11.19.	368	㈜디케이엘	제한 경쟁	완료
	남원지구 대체취수원 개발사업	취수원(1,300㎥/일) 개발 1식	ʼ23.05.24. ~ ʼ23.11.19.	217	㈜기반 이엔씨	제한 경쟁	완료
	와산지구 상수도 시설공사	배수지(1,000㎥) 신설 1식	ʼ23.06.07. ~ ʼ24.04.01.	815	제일건설(주)	제한 경쟁	완료
	교래지구 도수관로 시설공사	도수관로 L=1.09㎞	ʼ23.06.14. ~ ʼ23.12.10.	587	풍기건설(주)	제한 경쟁	완료
	하례, 남원지구 대체취수원 개발사업 관급자재(SUS파이프) 구입	SUS파이프 58본 구입	ʼ23.06.14. ~ ʼ23.07.25.	47	(주)영아리환경기술	제한 경쟁	완료
상수도부	동홍지구 배수지 확충공사	배수지(4,000㎥) 신설 1식	ʼ23.06.21. ~ ʼ24.11.23.	2,247	㈜이수종합건설	제한 경쟁	완료
	원인자부담금(화북상업지구) 상수도 시설사업	상수도 신설 D250~400mm L=2.6km	ʼ23.06.22. ~ ʼ25.01.26.	1,740	황금건설(주)	제한 경쟁	완료
	동홍지구 배수지 확충공사 전기공사	배수지(4,000㎥) 신설에 따른 전기공사 1식	ʼ23.07.20. ~ ʼ24.11.15.	259	대성전기	제한 경쟁	완료
	교래지구 도수관로 시설공사 전기공사	교래지구 지하수개발에 따른 전기공사 1식	ʼ23.07.27. ~ ʼ24.02.19.	326	대호전기 소방	제한 경쟁	완료
	2023년 하반기 수질검사 시약, 초자류 구매	시약, 초자류 133종 구매	ʼ23.09.07. ~ ʼ23.10.07.	81	그린랩사이언스	제한 경쟁	완료
	교래지구 도수관로 시설공사 전기공사 자재(수밀형동심중성선케이블) 구입	고압케이블 2.4km구입	ʼ23.11.03. ~ ʼ23.12.08.	44	제주스토어	일반 경쟁	완료
	공법기자재 - 애월정수장 고도정수처리시설사업	막여과 (Q=23,000톤/일) 1식	ʼ22.06.22. ~ ʼ23.12.19.	5,060	금호건설(주)	조달계약 (수의)	완료
	지하수 예비용 수중모터 구매	수중모터 구입 1식	ʼ23.01.20. ~ ʼ23.04.29.	177	하귀올레	제한 경쟁	완료
	2023년 상수도 소독약품(정제소금) 단가계약 구입	소독약품 구입 1식	ʼ23.02.08. ~ ʼ23.12.31.	115	유(you)기획	일반 경쟁	완료
	어승생정수장(서부간선) 송수관로 긴급복구공사	상수도시설공사 L=2.05km	ʼ23.03.06. ~ ʼ23.07.03.	429	늘푸른 건설(주)	제한 경쟁	완료
	한림정수장 고도정수처리시설 NF멤브레인(1계열) 구입교체	멤브레인 구입교체 1식	ʼ23.03.15. ~ ʼ23.08.11.	226	효림 이엔아이(주)	조달 계약	완료
	서귀포시 상예수원지 취수량 급감에 따른 긴급 상수도 관로 연결공사	상수도시설공사 L=0.60km	ʼ23.03.27. ~ ʼ23.05.25.	144	호암건설(주)	수의 계약	완료
	농어촌생활용수 급수취약지역(대정지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=0.85km	ʼ23.04.04. ~ ʼ23.09.30.	155	(주)국영건설	제한 경쟁	완료
	조천1,2가압장 외 4개소 노후 원심펌프 제작 설치	펌프 제작설치 1식	ʼ23.04.05. ~ ʼ23.11.30.	738	(주)신한알앤디	조달 계약	완료
	2023년 상수도생산관리과 관용차량(2톤 구동 픽업 트럭) 구입	관용차량 구입 1식	ʼ23.04.06. ~ ʼ23.09.02.	24	현대자동차(주)	수의 계약	완료
	소규모 수도시설(남원지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=0.90km	ʼ23.04.06. ~ ʼ23.10.02.	152	명부건설(주)	제한 경쟁	완료
상수도부	농어촌생활용수 급수취약지역(애월지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=3.33km	ʼ23.04.07. ~ ʼ23.12.07.	687	(주)웅진건설	제한 경쟁	완료
	농어촌생활용수 급수취약지역(한림지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=1.44km	ʼ23.04.07. ~ ʼ23.10.03.	223	정진건설(주)	제한 경쟁	완료
	노후정수장(월산) 개량사업 관급자재(기계-진공펌프) 구입	관급자재 구입 1식	ʼ23.04.10. ~ ʼ23.06.19.	73	(주)그린텍	제한 경쟁	완료
	소규모 수도시설(우도지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=0.83km	ʼ23.04.12. ~ ʼ23.10.08.	284	금장건설(주)	제한 경쟁	완료
	소규모 수도시설(성산지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=1.35km	ʼ23.04.14. ~ ʼ23.10.10.	490	㈜도암 엔지니어링	제한 경쟁	완료
	농어촌생활용수 급수취약지역(구좌지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=0.66km	ʼ23.04.14. ~ ʼ23.10.10.	325	성림건설(주)	제한 경쟁	완료
	소규모 수도시설(조천지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=1.97km	ʼ23.04.17. ~ ʼ23.12.17.	425	대광건설(주)	제한 경쟁	완료
	소규모 수도시설(표선지구) 상수도시설공사	상수도시설공사 L=1.35km	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.10.14.	416	대고건설(주)	제한 경쟁	완료
	지능형수처리운영센터종합컨트롤타워구축(거점·지점정수장)계장제어시스템제작설치	계장제어시스템 제작설치 1식	ʼ23.04.20. ~ ʼ23.12.25.	2,638	(주)대은계전	조달 계약	완료
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 에너지회수장치 제작구매설치	에너지회수장치 제작설치 1식	ʼ23.04.24. ~ ʼ23.05.21.	132	하지공업(주)	조달 계약	완료
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 RO설비(A,B호기) 고압펌프 등 긴급 공사	RO설비 긴급공사 1식	ʼ23.04.25. ~ ʼ23.05.14.	166	(주)남천개발	제한 경쟁	완료
	농어촌생활용수 급수취약지역(한경지구) 상수도 시설공사	상수도시설공사 L=2.63km	ʼ23.05.04. ~ ʼ23.12.29.	588	(주)신의건설	제한 경쟁	완료
	삼양3수원지 고도정수처리시설 RO멤브레인(3,4,5계열) 구입교체	멤브레인 구입교체 1식	ʼ23.05.08. ~ ʼ23.07.25.	465	㈜씨제이 케이	조달 계약	완료
	지능형수처리운영센터종합컨트롤타워구축(오라가압장 외) 계장제어시스템 제작설치	계장제어시스템 제작설치 1식	ʼ23.05.10. ~ ʼ24.01.14.	263	㈜테크원 시스템	제한 경쟁	완료
	노후정수장(월산) 개량사업 응집제 자동주입제어설비 제작설치 조달구입	응집제 자동주입제어설비 제작설치 1식	ʼ23.05.11. ~ ʼ23.08.02.	273	㈜미르 메이트	조달계약 (경쟁)	완료
상수도부	지능형수처리운영센터종합컨트롤타워구축(아라가압장 외) 계장제어시스템 제작설치	계장제어시스템 제작설치 1식	ʼ23.05.12. ~ ʼ24.01.16.	213	두신기술	제한 경쟁	완료
	삼양1,2수원지 노후 수배전반 교체 전기공사	노후 수배전반 교체공사 1식	ʼ23.05.17. ~ ʼ23.11.12.	169	신화전력(주)	제한 경쟁	완료
	노후정수장(월산) 개량사업 계장제어시스템 조달구입(계속비 계약) 2023년 시행분	계장제어시스템 제작설치 1식	ʼ23.05.30. ~ ʼ23.08.30.	208	㈜대은계전	조달 계약	완료
	추자정수장 RO설비 A호기 RO멤브레인 긴급교체	멤브레인 구입교체 1식	ʼ23.06.01. ~ ʼ23.06.30.	47	㈜아쿠아 지노텍	수의 계약	완료
	2022년 정밀안전점검결과 시설물 보수공사	시설물 보수공사 1식	ʼ23.06.16. ~ ʼ23.08.14.	157	정성토건(주)	제한 경쟁	완료
	외도수원지 노후 송수펌프(양흡입벌류트) 제작 설치 조달 구입	펌프 제작설치 1식	ʼ23.06.20. ~ ʼ23.12.17.	106	한국펌프공업협동조합	조달계약 (수의)	완료
	노후정수장(별도봉) 개량사업 가압펌프 계장제어반 제작 설치	계장제어반 제작설치 1식	ʼ23.06.23. ~ ʼ23.11.29.	119	㈜아진	제한 경쟁	완료
	삼양 광역수원 노후 수배전반 교체공사 관급자재(배전반및 전동기제어반)	배전반, 전동기제어반 제작설치 1식	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.12.24.	536	㈜대은계전	조달계약 (경쟁)	완료
	함덕 광역수원 노후 수배전반 교체공사 관급자재(배전반 및 전동기제어반)	배전반, 전동기제어반 제작설치 1식	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.12.24.	427	㈜에코산전	조달계약 (경쟁)	완료
	노후정수장(별도봉) 개량사업(계속비 계약) 2023년 시행분	별도봉정수장(35,000㎥/일) 개량 1식	ʼ23.06.28. ~ ʼ23.10.31.	639	풍림건설(주)	제한 경쟁	완료
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 RO설비(C,D호기) 긴급 개량공사	RO설비 긴급공사 1식	ʼ23.07.03. ~ ʼ23.09.20.	494	삼다 이엔지(주)	제한경쟁	완료
	노후정수장(월산) 개량사업 정밀여과장치 설치공사	월산정수장(24,000㎥/일) 개량 1식	ʼ23.07.28. ~ ʼ23.11.24.	241	대아토건(주)	제한 경쟁	완료
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 RO설비(C,D호기) 긴급 개량 계장제어시스템 제작설치	계장제어시스템 제작설치 1식	ʼ23.09.27. ~ ʼ23.12.15.	152	㈜대은계전	제한 경쟁	완료
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 RO설비(C,D호기) 개량공사 관급자재 구입	에너지회수장치, 고압펌프 구입 1식	ʼ23.09.06. ~ ʼ23.10.06.	223	㈜플러스 엔텍	제한 경쟁	완료
상수도부	오라(4,5호공) 지하수관정 계장제어장치 제작설치	계장제어장치 제작설치 1식	ʼ23.10.18. ~ ʼ23.12.21.	77	협신산전㈜	제한 경쟁	완료
	서광정수장 비상발전기 설치 전기공사	비상발전기 설치 전기공사 1식	'23.11.01. ~ '24.02.28.	145	용산전력㈜	제한 경쟁	완료
	서광정수장 비상발전기 설치 전기공사 관급자재(비상발전기)	비상발전기 구입 1식	ʼ23.11.02. ~ ʼ23.12.21.	249	㈜지엔씨 에너지	제한 경쟁	완료
	오라가압장 노후 수배전반 교체 전기공사 관급자재 조달 구입	배전반 구입 1식	ʼ23.11.02. ~ ʼ23.12.21.	751	㈜에코 파워텍	제한 경쟁	완료
	광역1단계 선흘광역수원 외 노후 지하수관정 전동기제어반 제작설치 조달구입	전동기 제어반 제작 설치 1식	ʼ23.11.02. ~ ʼ23.12.21.	89	㈜탐라계전	제한 경쟁	완료
	강정정수장 현대화사업 막여과 공법자재 조달구입 시행	막여과 공법자재 (Q=25,000㎥/일) 구입 1식	ʼ23.11.02. ~ ʼ23.12.21.	5,981	효성화학㈜	제한 경쟁	완료
	지하수 노후 기동반 교체 및 계장제어장치 긴급 제작설치 시행	기동반, 계장제어장치 제작설치 1식	ʼ23.11.02. ~ ʼ23.12.21.	138	㈜대은계전	조달계약 (수의)	완료
	토평정수장 고도정수 처리시설사업 (토목,건축,기계)	고도정수처리시설 (12,400㎥/일) 1식	'23.11.14. ~ '25.11.12.	8,756	영선토건㈜	제한 경쟁	추진중
	조천정수장 관할 함덕광역수원 외 1개소 지하수 관정 기동반 제작 조달구매	지하수관정 긱동반 제작 설치 1식	ʼ23.11.29. ~ ʼ23.12.28.	97	㈜티비	제한 경쟁	완료
	토평정수장 고도정수 처리시설사업 전기공사	고도정수처리시설 (12,400㎥/일) 전기 공사 1식	'23.12.11. ~ '25.12.09.	1,050	진흥기업㈜	제한 경쟁	추진중
	지능형 수처리 운영센터 종합컨트롤타워 구축(남원정수장외) 네트워크스위치	네트워크스워치 구입 1식	ʼ23.12.12. ~ ʼ23.12.28.	72	㈜에이씨엔티시스템	제한 경쟁	완료
	조천정수장 고도정수 처리시설사업 (토목,건축,기계)	고도정수처리시설 (37,000㎥/일) 1식	'23.12.15. ~ '26.12.13.	16,707	유림종합 건설㈜	일반 경쟁	추진중
	강정정수장 현대화사업 (토목,건축,기계)	정수장 현대화 (25,000㎥/일) 1식	'23.12.15. ~ '26.12.13.	18,989	우석종합 건설㈜	일반 경쟁	추진중
	소형생물 대응체계 구축 정밀여과장치 조달구입	정밀여과장치 구입 1식	ʼ23.12.18. ~ ʼ23.04.24.	135	보선워터텍	조달계약 (수의)	완료
	`23년 스마트 원격검침 디지털 미터기 교체공사(제주시 동지역)	디지털미터기 1945전	ʼ23.03.03. ~ ʼ23.07.30.	144	조성건설(주)	제한 경쟁	완료
	아라가압장 배수지 유출유량계 설치공사	유량계설치 1식	ʼ23.03.28. ~ ʼ23.06.23.	116	두원개발(주)	제한 경쟁	완료
상수도부	한림·한경 소규모 유량, 수압 감시시스템 구축사업	유량감시 33개소, 수압감시 15개소	ʼ23.04.11. ~ ʼ23.10.07.	408	정호건설(주)	제한 경쟁	완료
	김녕사굴지구 상수관로 개선공사	배수관(D100) 신설 L=666.5m	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.08.20.	192	(주) 디에이치건설	제한경쟁	완료
	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사	송수관로 D150~250 L=1.73㎞	ʼ23.05.03. ~ ʼ23.10.29.	539	(주)지에스 건설	제한 경쟁	완료
	대정·안덕 소규모 유량, 수압 감시시스템 구축사업	유량감시 19개소, 수압감시 11개소	ʼ23.05.26. ~ ʼ23.10.22.	247	진명건설(주)	제한 경쟁	완료
	2023년 조천대블록 2공구 누수처 복구공사	누수처복구 210개소	ʼ23.06.20. ~ ʼ23.11.26.	190	(주)아람건설	제한 경쟁	완료
	2023년 남원대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 200개소	ʼ23.06.22. ~ ʼ23.11.28.	184	세풍건설(주)	제한 경쟁	완료
	2023년 애월대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 210개소	ʼ23.06.23. ~ ʼ23.11.29.	187	(주)신용건설	제한 경쟁	완료
	2023년 조천대블록 1공구 누수처 복구공사	누수처복구 210개소	ʼ23.06.23. ~ ʼ23.11.29.	188	대명토건(주)	제한 경쟁	완료
	2023년 표선대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 200개소	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.12.03.	183	(주)하이플	제한 경쟁	완료
	한경면 조수(소) 판포계통 상수관망 개선사업	배수관로 D100㎜~150㎜, L= 4.53㎞	ʼ23.07.07. ~ ʼ24.10.18.	1,052	(주)고현종합건설	제한 경쟁	추진중
	송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사	상수관로 D50~200mm, L=4.46km	ʼ23.07.11. ~ ʼ24.02.11.	829	(주)나라건설기계	제한 경쟁	완료
	송당리 마을안길 노후상수관로 교체공사	상수관로 D80~150mm, L=1.88km,	ʼ23.07.28. ~ ʼ24.04.23.	812	대아건설(주)	제한 경쟁	완료
	조천소블록(소공원) 상수관망 긴급개선공사	배수관로 D80 L=1.373km 정비	ʼ23.08.01. ~ ʼ23.08.25.	123	호암건설(주)	수의 계약	완료
	2023년 구좌대블록 누수처 복구공사	누수처복구 150개소	ʼ23.08.14. ~ ʼ24.01.20.	132	흥국건설(주)	제한 경쟁	완료
	2023년 성산대블록 누수처 복구공사	누수처복구 150개소	ʼ23.08.14. ~ ʼ24.01.20.	131	혜명환경 건설(주)	제한 경쟁	완료
	2023년 조천읍 대블록 누수처 복구공사	누수처복구 210개소	ʼ23.09.12. ~ ʼ23.12.25.	185	홍남건설(주)	제한 경쟁	완료
	상수도 관망 감압밸브 부속설비(시간설정 이중제어) 제작설치	감압밸브 부속설비 제작 설치 1식	ʼ23.06.01. ~ ʼ23.06.20.	37	(주)바램	수의 계약	완료
	스마트 관망관리 원격자동검침시스템(단말기 설치) 구축사업	원격검침 단말기 설치 9,770개	ʼ23.10.06. ~ ʼ23.12.22.	281	(주)청호정밀(청호솔루션)	수의 계약	완료
	목석원1호 지하수 관정 계장제어장치 제작설치	계장제어장치 제작설치 1식	ʼ23.11.08. ~ ʼ23.12.11.	40	(주)정우계전	수의 계약	완료
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구) 23년	차집관로 정비 L=496m 중계펌프장 1개소 개량	ʼ23.01.30. ~ ʼ23.12.31.	550	㈜천마종합건설	제한 경쟁	완료
	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(2공구) 23년	차집관로 정비 L=678.5m	ʼ23.01.30. ~ ʼ23.11.30.	883	㈜건축사사무소오름그룹	제한 경쟁	완료
	남원하수처리장 노후차집관로 정비사업 전기 및 계측제어공사(1공구) 23년	중계펌프장 1개소 개량	ʼ23.06.26. ~ ʼ24.06.30.	118	㈜대은	제한 경쟁	완료
	성산3 하수관로 정비공사(2공구) 23년 시행분	오수관로 L=3,111m 배수설비 40가구	ʼ23.02.20. ~ ʼ23.12.15.	1,984	영보건설(주)	제한 경쟁	완료
	성산3 하수관로 정비공사(3공구) 23년 시행분	오수관로 L=2,106m 배수설비 108가구	ʼ23.02.20. ~ ʼ23.12.31.	2,164	세기건설(주)	제한 경쟁	완료
	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구)	차집관로 정비 5.05㎞	ʼ23.06.22. ~ ʼ26.06.21.	4,600	세호 종합건설(주)	제한 경쟁	추진중 (5%)
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 1공구 23년 시행분	오수관로 L=2,982m 배수설비 280가구	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10.	3,680	주식회사 도현종합건설	제한 경쟁	완료
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 2공구 23년 시행분	오수관로 L=1,450m 배수설비 190가구	ʼ22.12.11. ~ ʼ23.12.10.	2,631	주식회사 천마종합건설	제한 경쟁	완료
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 3공구 23년 시행분	오수관로 L=920m 배수설비 204가구	ʼ22.12.11. ~ ʼ24.05.28.	1,959	태경개발 주식회사	일반 경쟁	완료
	서귀포 중문관광단지 하수관로정비공사(1공구) 23년 시행분	오수관로 L=334m, 펌프장 신설 1식	ʼ23.01.03. ~ ʼ23.12.28.	1,252	(주)대웅건설	제한 경쟁	완료
	서귀포 중문관광단지 하수관로정비사업(2공구) 23년 시행분	NATM L=173m	ʼ23.01.03. ~ ʼ23.12.28.	5,710	원진 종합건설(주)	일반 경쟁	완료
	서귀포 중문관광단지 하수관로정비 전기및계측제어공사 23년 시행분	전기및계측제어 1식	ʼ23.01.03. ~ ʼ23.12.31.	257	(주)유영	제한 경쟁	완료
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사(2차분)	오수관로 L=1,554m	ʼ23.03.14. ~ ʼ23.09.09. (ʼ23.07.04 공사일시정지)	456	금성 종합건설(주)	제한 경쟁	일시정지중 (70%)
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(1공구)(4차분)	차집관로 L=0.7㎞	ʼ23.02.28. ~ ʼ23.05.28.	518	태웅 종합건설(주)	제한 경쟁	완료
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(2공구)(2차분)	차집관로 L=0.7㎞ 맨홀 22개소	ʼ23.03.17. ~ ʼ23.11.30.	625	용우 종합건설(주)	제한 경쟁	완료
하수도부	서귀포시 안덕면 사계리 하수관로 신설사업	차집관로 L=0.5㎞	ʼ23.06.23. ~ ʼ23.09.20.	177	명부건설(주)	제한 경쟁	완료
	서귀포시 안덕면 사계리 배수설비 정비사업	배수설비 54가구	ʼ23.05.31. ~ ʼ23.08.30.	328	광명종합 건설(주)	제한 경쟁	완료
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업 (2단계) 1공구 23년 시행분	하수관로 L=0.1㎞ 배수설비 36가구	'22.12.11. ~ '23.05.31.	495	성림건설㈜	제한 경쟁	완료
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업 (2단계) 2공구 23년 시행분	하수관로 L=0.15㎞ 배수설비 12가구	'22.12.11. ~ '23.05.31.	339	용우종합건설㈜	제한 경쟁	완료
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구, 6차분)	오수관로 0.7km, 배수설비 79가구	ʼ23.01.15. ~ ʼ23.08.30.	1,039	영주 종합건설	일반 경쟁	완료
	남원처리구역 하수관로 정비사업(3공구, 6차분)	오수관로 0.5km, 배수설 46가구	ʼ23.01.16. ~ ʼ23.04.12.	174	대원 종합건설	일반 경쟁	완료
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계) 2공구	오수관로 2.6km, 맨홀펌프장 2개소	ʼ23.03.13. ~ ʼ26.03.12.	4,900	신화 종합건설	일반 경쟁	추진중 (32%)
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계) 3공구	오수관로 1.5km, 맨홀펌프장 1개소	ʼ23.03.13. ~ ʼ26.03.12.	5,595	금나 종합건설	일반 경쟁	추진중 (22%)
	남원공공하수처리시설 증설사업 관급자재(탈취기)	탈취기 310㎥/min 구입 설치	ʼ23.03.23. ~ ʼ23.05.22.	504	대승 엔지니어링	수의 계약 (성능 인증)	완료
	남원공공하수처리시설 증설사업 관급자재(계측기기)	DO,MLSS,pH 측정기	ʼ23.02.23. ~ ʼ23.06.30.	76	정우계전	내자 계약	완료
	남원공공하수처리시설 증설사업 관급자재(계장제어시스템)	CS반 개량 및 현장제어반 설치	ʼ23.04.26. ~ ʼ23.08.28.	241	지엘파워	입찰	완료
	동부하수처리장 증설사업 관급자재(탈취기,동복p/s)	탈취기(20㎥/min) 1대	ʼ23.03.07. ~ ʼ25.05.11.	225	㈜한주나노	조달 계약	추진중 (50%)
	동부하수처리장 증설사업 관급자재(탈취기,북촌p/s,서김녕p/s)	탈취기(75㎥/min) 2대	ʼ23.07.12. ~ ʼ25.07.02.	588	㈜유성 엔지니어링	조달 계약	추진중 (30%)
	동부하수처리장 증설사업 관급자재(탈취기,동부하수 처리장)	탈취기(240㎥/min) 1대 탈취기(220㎥/min) 1대	ʼ23.05.25. ~ ʼ25.07.02.	1,016	㈜유성 엔지니어링	조달 계약	추진중 (70%)
하수도부	동부하수처리장 증설사업 관급자재(탈취기,동김녕p/s) 조달구입	탈취기(20㎥/min) 1대	계약일로부터 180일	164	(사)대한민국공무원 공상유공자회 기계사업부	조달 계약	계약중
	도두하수처리구역 하수관로정비사업(용담2공구) 23년 시행분	오수관로 1,368m	ʼ22.12.21. ~ ʼ23.10.20.	1,745	(주)일흥종합건설	제한 경쟁	완료
	도두하수처리구역 하수관로정비사업(용담3공구) 23년 시행분	오수관로 1,600m	ʼ22.12.21. ~ ʼ23.10.25.	1,160	대림토건주식회사	제한 경쟁	완료
	제주서부공공하수처리시설 증설공사 (23년 시행분)	처리장 증설 20,000㎥/일	ʼ23.01.17. ~ ʼ23.12.24.	3,674	부건종합건설 주식회사	일반 경쟁	완료
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	협잡물종합처리기 (300㎥/h) 4대	ʼ23.07.04. ~ ʼ24.03.31.	1,263	㈜대승 엔지니어링	조달 계약 (자재선정위원회)	완료
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	슬러지 펌프 16대 정량펌프 16대	ʼ23.09.06. ~ ʼ24.01.04.	327	(주)삼진유체기계	조달 계약 (지명 경쟁)	완료
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	교반기 8대	ʼ23.11.01. ~ ʼ24.01.04.	173	에스엠산업	조달 계약 (지명 경쟁)	완료
	오라·아라(1공구) 하수관로 정비사업 3차분	오수관정비 L=1.85km, 배수설비 141가구	ʼ23.02.06. ~ ʼ24.6.19.	3,045	일호 종합건설(주)	제한 경쟁	완료
	오라·아라 하수관로 정비사업(2공구) 시행분	오수관정비 L=2.34km, 배수설비 201가구	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.12.21.	2,500	주원 종합건설(주)	제한 경쟁	완료
	오라·아라 하수관로 정비사업(3공구) 시행분	오수관정비 L=2.2km, 배수설비 204가구	ʼ23.01.09. ~ ʼ23.11.17.	2,349	이수 종합건설(주)	제한 경쟁	완료
	서부처리구역 하수관로 정비공사(2단계.하귀2리 2공구) 3차분	하수관로, 배수설비 정비 1식	ʼ23.04.05. ~ ʼ23.12.23.	1,789	청도종합건설주식회사	제한 경쟁	완료
	서부처리구역 하수관로 정비공사(2단계-1공구) 23년도 시행분	오수관로 L=1.893km 배수설비 56가구	ʼ23.01.16. ~ ʼ23.12.20.	2,009	네오종합건설주식회사	일반 경쟁	완료
	서부처리구역 하수관로 정비공사(2단계-4공구) 23년도 시행분	오수관로 L=1.853km 배수설비 57가구	ʼ22.11.17. ~ ʼ23.12.16.	1,583	금정종합건설주식회사	일반 경쟁	완료
하수도부	서부처리구역 하수관로 정비공사(2단계-2공구) 23년도 시행분	오수관로 L=1.195km 배수설비 43가구	ʼ23.06.30. ~ ʼ23.12.31.	1,034	덕성종합건설주식회사	일반 경쟁	완료
	서부하수처리구역(저지·청수~판포간) 차집관로 정비공사 23년도 시행분	차집관로 L=0.52km	ʼ23.06.30. ~ ʼ23.12.31.	391	우보종합건설주식회사	일반 경쟁	완료
	한림 비양도 소규모 하수관로 정비공사	관로 585.7m 배수설비 2가구	ʼ23.02.28. ~ ʼ23.08.26.	228	웅지건설(주)	일반 경쟁	완료
	조천처리분구 하수관로 정비사업(1공구) 23년 시행분	오수관로 L=2.44km	ʼ23.01.30. ~ ʼ23.12.31.	1,150	청도종합건설주식회사	제한 경쟁	완료
	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업 전기공사 (23년 시행분)	전기공사 1식	ʼ22.12.25. ~ ʼ23.12.24.	259	지성전력(주)	제한 경쟁	완료
	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업 소방공사 23년 시행분	소방공사 1식	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.12.24.	70	가나소방(주)	제한 경쟁	완료
	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업 통신공사 23년 시행분	통신공사 1식	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.12.24.	50	지에이치정보통신(주)	제한 경쟁	완료
	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업 계측제어공사 23년 시행분	계측제어공사 1식	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.12.24.	20	㈜보성기업	제한 경쟁	완료
	2023 BTL 사업분구 내 배수설비 전기공사 자가펌프장 제어반 제작설치	현장제어반 8면 제작	ʼ23.02.28. ~ ʼ23.06.28.	33	윤성 제어기술(주)	제한 경쟁	완료
	서부처리구역 하수관로 정비(2단계-1공구) 계장제어장치 제작 납품 23년 시행분	맨홀펌프제어반 4면, 자가펌프제어반 4면 제작	ʼ23.08.28. ~ ʼ23.12.22.	130	㈜영진전기	제한 경쟁	완료
	서부처리구역 하수관로 정비(2단계-하귀2리 2공구) 계장제어시스템 제작 설치	맨홀펌프제어반 4면, 자가펌프제어반 14면 제작	ʼ23.06.23. ~ ʼ24.01.08.	198	두신기술	제한 경쟁	완료
	서부(판포)하수처리장 증설사업 계측제어공사	계장제어시스템 제작 1식	ʼ23.02.06. ~ ʼ25.06.30.	501	㈜대은계전	조달 계약 (지명 경쟁)	추진중 (50%)
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비(하수관로) 전기공사 관급자재(자가펌프제어반)	자거펌프제어반 8면 제작	ʼ23.08.24. ~ ʼ24.05.30.	26	㈜티비	조달 계약	완료
	조천처리분구 하수관로 정비사업(1공구) 전기공사 관급자재(맨홀펌프제어반)	맨홀펌프제어반 8면 제작	ʼ23.06.19. ~ ʼ24.10.13.	183	㈜대은계전	조달 계약	완료
	한림 비양도 소규모 하수관로 정비 전기공사 관급자재(맨홀펌프제어반)	맨홀펌프제어반 1면 제작	ʼ23.03.10. ~ ʼ23.08.24.	23	㈜대은계전	조달 계약	완료
하수도부	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형1공구) 23년 시행분	오수관로 0.68km 배수설비 637개소	ʼ22.12.24. ~ ʼ23.11.19.	1,241	㈜아람	제한 경쟁	완료
	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형2공구) 23년 시행분	오수관로 1.98km 배수설비 180개소	ʼ22.12.24. ~ ʼ23.11.18.	2,151	금나 종합건설㈜	제한 경쟁	완료
	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(연동1공구) 23년 시행분	오수관로 0.24km 배수설비 183개소	ʼ22.12.24. ~ ʼ23.12.23.	1,400	㈜지원건설	제한 경쟁	완료
	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(연동2공구) 23년 시행분	오수관로 0.76km 배수설비 165개소	ʼ22.12.24. ~ ʼ23.12.23.	1,527	㈜신광 종합건설	제한 경쟁	완료
	제주하수처리구역 차집관로 및 펌프장 비상자재 보관용 창고 신축공사	창고 신축 1식	ʼ23.02.02. ~ ʼ23.05.19.	176	주식회사 보국디자인	제한 경쟁	완료
	제주하수처리구역 병문중계펌프장 노후 고압전동기 제어반 교체공사	고압 제어반 교체공사 1식	ʼ23.02.02. ~ ʼ23.05.03.	105	㈜해난디	제한 경쟁	완료
	제주하수처리구역 병문중계펌프장 노후 고압전동기 제어반 교체공사 관급자재 조달 구입	전동기 제어반 구입 1식	ʼ23.02.02. ~ ʼ23.03.14.	404	㈜에코파워텍	제한 경쟁	완료
	제주시 동지역 오수간이펌프장 노후 전동기 제어반 교체 제작․설치	전동기 제어반 구입 1식	ʼ23.08.24. ~ ʼ23.10.30.	50	㈜정우계전	조달 계약	완료
	제주하수처리구역 간이펌프장 5개소 노후 전동기제어반 제작설치 구입	전동기 제어반 구입 1식	ʼ23.03.15. ~ ʼ23.06.19.	97	㈜에코산전	조달 계약	완료
	서회천도로변 오수펌프장 처리구역 차집관로 개량공사	압송관로(D150mm) 1,853m 신설	ʼ23.02.24. ~ ʼ23.08.18.	300	삼록건설(주)	제한 경쟁	완료
	제주시 동지역 중계 및 간이펌프장 노후 전동기제어반 교체 제작․설치	전동기 제어반 구입 1식	ʼ23.11.13. ~ ʼ23.12.15.	142	㈜에코파워텍	조달 계약	완료
	제주하수처리장 간이 하수펌프장 예비펌프 구입	수중펌프 구입 18대	ʼ23.05.25. ~ ʼ23.08.08.	118	㈜오비스	조달 계약	완료
	제주시 동지역 하수펌프장 예비펌프 구입	수중펌프 구입 6대	ʼ23.11.15. ~ ʼ23.12.19.	83	기산수기	조달 계약	완료
하수도부	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(1)	유기응집제 5,000Kg	ʼ23.01.09. ~ ʼ23.02.09.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	제주하수운영과(제주,동부,서부하수처리장) 1톤 크레인 차량 조달 구입	1톤 크레인 차량(3대) 및 유압구동장치(3조)	ʼ23.01.18. ~ ʼ23.04.19.	127	㈜동해기계항공	조달 계약	완료
	동부하수처리장 무기응집제(황산알루미늄) 단가구입	무기응집제(황산알루미늄) 200,000L	ʼ23.02.15. ~ ʼ23.12.31.	85	연승기업	단가 구입	완료
	동부하수처리장 단일채널 수중오수펌프 구입	수중오수펌프 구입 20대	ʼ23.03.02. ~ ʼ23.04.30.	69	주식회사 신성터보 마스터	수의 1인 견적	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(2)	유기응집제 5,000Kg	ʼ23.03.09. ~ ʼ23.04.09.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동부하수처리장 북촌중계펌프장 평면스크린 조달 구입	평면스크린 구입 1식	ʼ23.03.20. ~ ʼ23.06.17.	112	주식회사효성엔바이로	조달 계약	완료
	동부, 서부하수처리장 수질TMS 수질자동측정기기(TN, TP) 조달구입	TN, TP 측정기기 2set	ʼ23.03.19. ~ʼ 23.05.19.	163	주식회사에이치코비	조달 계약	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(3)	유기응집제 5,000Kg	ʼ23.04.10. ~ ʼ23.05.10.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동김녕중계펌프장 비상발전기 구입	디젤발전기 구입 1식	ʼ23.04.21. ~ ʼ23.07.31.	56	㈜지엔씨 에너지	조달 계약	완료
	동부하수처리장 중계펌프장 원격감시제어반 제작·설치	원격감시제어반 제작·설치(6개소)	ʼ23.05.22. ~ ʼ23.08.16.	165	주식회사 대은계전	조달 계약	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(4)	유기응집제 5,000Kg	ʼ23.05.30. ~ ʼ23.06.30.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(5)	유기응집제 5,000Kg	ʼ23.07.06. ~ ʼ23.08.06.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(6)	유기응집제 5,000Kg	ʼ23.09.18. ~ ʼ23.10.18.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	제주시 위생처리장 (동부,서부) 노후기계설비 정비공사 관급자재(폴리머 자동용해장치) 구입	폴리머 자동용해장치 2대	ʼ23.05.24. ~ ʼ23.07.13.	112	㈜이코우	경쟁 입찰	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ23.01.04. ~ ʼ23.02.03.	33	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
하수도부	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(2)	응집제 7,000Kg	ʼ23.02.06. ~ ʼ23.03.08.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(3)	응집제 7,000Kg	ʼ23.02.24. ~ ʼ23.03.23.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(4)	응집제 8,000Kg	ʼ23.04.11. ~ ʼ23.05.11.	26	에스엔에프코리아	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(5)	응집제 8,000Kg	ʼ23.04.21. ~ ʼ23.05.21.	31	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(6)	응집제 8,000Kg	ʼ23.05.15. ~ ʼ23.06.14.	31	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(7)	응집제 8,000Kg	ʼ23.06.12. ~ ʼ23.07.12.	31	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(8)	응집제 8,000Kg	ʼ23.07.26. ~ ʼ23.08.25.	31	(주)에스와이켐	조달 계약	사업완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(9)	응집제 8,000Kg	ʼ23.08.25. ~ ʼ23.09.24.	31	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(10)	응집제 8,000Kg	ʼ23.10.05. ~ ʼ23.11.04.	31	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(11)	응집제 8,000Kg	ʼ23.11.08. ~ ʼ23.12.08.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(12)	응집제 8,000Kg	ʼ23.12.11. ~ ʼ24.01.10.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	2023년 서부하수처리장 탈취제(차아염소산나트륨) 단가구입	치아염소산나트륨 60,000L	ʼ23.01.27. ~ ʼ23.12.31.	37	이루다코리아	경쟁 입찰	완료
	서부하수처리장 무기응집제(황산알루미늄) 단가구입	무기응집제(황산알루미늄) 360,000L	ʼ23.03.08. ~ ʼ23.12.31.	145	주식회사 대석기업	입찰	완료
	23년 서부하수처리장 탈취제(가성소다25%)단가구입 계약체결	탈취기약품(가성소다25%) 40,000L	ʼ23.03.08. ~ ʼ23.12.31.	22	제주케미칼	입찰	완료
	서부하수처리장 침사지동 협잡물 탈수기 조달구입	협잡물 탈수기 조달구입 2대	ʼ23.06.19. ~ ʼ23.08.18.	159	성진	경쟁 입찰	완료
	서부하수처리장 교반기 제작설치	교반기 제작설치 1식	ʼ23.07.06. ~ ʼ23.09.01.	33	주식회사 디에이치	입찰	완료
	서부하수처리장 재이용수 전처리시설(섬유여과기) 제작설치	전처리시설(섬유여과기) 제작설치 1식	ʼ23.07.17. ~ ʼ23.09.14.	266	㈜유천 엔바이로	조달 계약	완료
하수도부	서부하수처리장 한림중계펌프장 평면스크린 조달 구입	평면스크린 구매 1식	ʼ23.08.10. ~ ʼ23.11.14.	100	효성앤바이로	조달 계약	완료
	서부 하수처리 구역 간이펌프장 현장제어반 관급자재 구매설치	현장제어반 관급자재 구입 1식	ʼ23.04.11. ~ ʼ23.08.09.	28	(주)티비	조달 계약	완료
	곽지중계펌프장 일원 차집(압송)관로 이설공사	차집관로 이설공사 1식	ʼ23.05.10. ~ ʼ23.08.04.	180	용우종합건설	입찰	완료
	서부하수처리계통 간이펌프장 분전반 조달 구입	간이펌프장 분전반 조달구입 1식	ʼ23.10.23. ~ ʼ24.02.15.	98	주식회사 티비	조달 계약	완료
	자구리중계펌프장 미관개선 및 조경공사	중계펌프장 외벽 리모델링 및 조경시설 1식	ʼ23.03.31. ~ ʼ23.06.28.	183	도원조경(주)	제한 경쟁	완료
	자구리 중계펌프장 외 3개소 탈취기 약품 구입	아큐사이드100A 4,000kg 아큐사이드100B 4,000kg 가성소다4.5%2,900kg 촉매반응기:4개	ʼ23.02.08. ~ ʼ23.02.20.	45	더존이엔텍	수의 1인 견적	완료
	자구리중계펌프장 월류수처리시설 계장제어시스템 제작구입	계장제어시스템 제작 구입 1식	ʼ22.07.04. ~ ʼ23.05.04.	89	(주)대은계전	수의 1인 견적	완료
	자구리중계펌프장 월류수 처리시설 전기공사	월류수처리시설 전기공사 1식	ʼ22.06.17. ~ ʼ23.04.26.	165	㈜흥진전력	입찰	완료
	보목하수처리장 드럼스크린 제작 구매 설치	드럼스크린 3대 구매 설치	ʼ22.11.23. ~ ʼ23.02.28.	425	㈜우신 이엔지	입찰	완료
	솜반천중계펌프장 계장제어시스템 제작설치	계장제어시스템 제작 설치 1식	ʼ23.04.17. ~ ʼ23.06.19.	89	(주)대은계전	수의 1인 견적	완료
	보목하수처리장 분리막 세정용약품(차아염소산나트륨) 단가구입	차아염소산나트륨 96,000kg	ʼ23.03.23. ~ ʼ23.12.31.	59	마루야	수의 2인 이상견적	완료
	서귀포하수처리장 4개소 수질TMS TOC측정기기 조달 구입	TMS TOC측정기기 4SET	ʼ23.01.13. ~ ʼ23.03.14.	237	주식회사 에이치코비	조달 계약	완료
	보목하수처리장 슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입(1)	유기응집제 6,000Kg	ʼ23.01.14. ~ ʼ23.02.03.	23	㈜에스엔에프코리아	조달 계약	완료
	보목하수처리장 슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입(2)	유기응집제 6,000Kg	ʼ23.02.15. ~ ʼ23.03.17.	23	㈜에스엔에프코리아	조달 계약	완료
하수도부	보목하수처리장 슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입(3)	유기응집제 6,000Kg	ʼ23.03.23. ~ ʼ23.04.22.	23	㈜에스엔에프코리아	조달 계약	완료
	보목하수처리장 슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입(4)	유기응집제 6,000Kg	ʼ23.07.11. ~ ʼ23.08.10.	23	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	보목하수처리장 슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입(5)	유기응집제 6,000Kg	ʼ23.08.11. ~ ʼ23.09.10.	23	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	보목하수처리장 슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입(6)	유기응집제 6,000Kg	ʼ23.12.04. ~ ʼ24.12.31.	23	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	색달하수처리장 최종침전지 슬러지 수집기 교체	프론트롤러형 슬러지수집기 4대	ʼ23.04.26. ~ ʼ23.07.25.	292	고려기술	조달 계약	완료
	색달하수처리장 UV소독설비 증설 및 개선공사	UV소독설비 증설 및 개선공사 1식	ʼ23.05.03. ~ ʼ23.05.24.	145	아람테크 주식회사	입찰	완료
	강정1중계펌프장 협잡물 압착식 탈수기 조달구입	협잡물탈수기 1대 구입(1㎥/hr, 2.2kW)	ʼ23.02.24. ~ ʼ23.04.23.	80	성진	조달 계약	완료
	색달하수처리장 슬러지탈수용 응집제 조달구입	유기응집제 8,000kg	ʼ23.03.09. ~ ʼ23.04.08.	27	에스엔에프코리아	조달 계약	완료
	색달하수처리장 슬러지탈수용 응집제 조달구입	유기응집제 7,000kg	ʼ23.07.19. ~ ʼ23.08.18.	24	에스엔에프코리아	조달 계약	완료
	색달하수처리장무기응집제 (폴리염화알루미늄 17%) 단가 구입	무기응집제 (45,000L)	ʼ23.04.07. ~ ʼ23.12.31.	37	비봉케미칼	일반 경쟁	완료
	색달하수처리장 탈취기 약품 및 소모품 구입	탈취기 약품 및 소모품 구입	ʼ23.02.21. ~ ʼ23.04.20.	45	더존이엔텍	수의 계약	완료
	색달하수처리장 중계펌프장 등 수중오수펌프 구입	수중펌프 6대 구입	ʼ23.11.29. ~ ʼ23.12.21.	57	성광수중 펌프(주)	조달 계약	완료
	색달하수처리장 슬러지 탈수용 응집제 조달구입	유기응집제 구입 1식	ʼ23.09.16. ~ ʼ23.10.31	26	㈜한솔케미칼	조달 계약	완료
	색달하수처리장 유기고분자 응집제 조달구입	유기고분자응집제 구입 1식	ʼ23.10.27. ~ ʼ23.12.05.	21	에스앤에프코리아	조달 계약	완료
	색달하수처리장 최초침전지 스컴스크린 조달구매 교체	스컴스크린 구매 1식	ʼ23.09.26. ~ ʼ23.12.21.	50	㈜에싸	조달 계약	완료
	대정하수처리장 태양광발전설비 전기공사 관급자재 구입	태양광 발전장치 50kW	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.09.04.	105	㈜이투지	조달 계약	완료
하수도부	대정4-2 펌프장 정비 전기공사-정동기제어반 관급자재 구입	전동기제어반 800W*1900H*700D	ʼ23.09.12. ~ ʼ23.12.10.	26	㈜에코산전	조달 계약	완료
	대정하수처리장 대정9중계펌프장 비상발전기 설치 전기공사 관급자재구입	디젤발전기 3Φ4W, 380/220V, 300kW	ʼ23.05.31. ~ ʼ23.08.28.	44	㈜이스트파워	조달 계약	완료
	제주(대정)하수처리장 생물반응조 터보 송풍기 제작구입	40㎡/min*6,000mmAq 1대	ʼ23.04.12. ~ ʼ24.01.05.	129	유성하이텍	조달 계약	완료
	대정하수처리장 중계펌프장용 수중펌프 조달구입	수중펌프 4대	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.08.26.	72	엔에스하이드로㈜	조달 계약	완료
	대정하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(1)	유기응집제 SC-310 7,000kg	ʼ23.01.02. ~ ʼ23.02.01.	28	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	대정하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(2)	유기응집제 SC-310 7,000kg	ʼ23.02.23. ~ ʼ23.03.22.	28	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	대정하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(3)	유기응집제 SC-240 7,000kg	ʼ23.05.04. ~ ʼ23.06.03.	28	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	대정하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(4)	유기응집제 SC-240 7,000kg	ʼ23.06.21. ~ ʼ23.07.20.	28	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	대정하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(5)	유기응집제 SC-240 7,000kg	ʼ23.08.30. ~ ʼ23.09.10.	28	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	대정하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달구입(6)	유기응집제 SC-240 7,000kg	ʼ23.11.01. ~ ʼ23.11.11.	26	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	대정하수처리장 반응조 5~6지 감시제어반 제작 설치	중앙운영실 이중화 PLC 교체 1식	ʼ23.02.10. ~ ʼ23.07.10.	135	㈜대은계전	수의 1인 견적	완료
	대정하수처리장 대정5중계펌프장 비상발전기 설치 전기공사 관급자재 구입	비상발전기 175kw	ʼ23.09.08. ~ ʼ23.11.08.	27	㈜이스트파워	조달 계약	완료
	대정위생처리장 스프르트펌프 구입	스프르트 펌프 3대	ʼ23.10.10. ~ ʼ23.11.29.	36	삼흥산업㈜	수의 계약	완료
	대정하수처리장 오수펌프장 및 차집관로 정비공사 관급자재 구입	펌프장 및 차집관로 정비고사 관급자재 1식	ʼ23.09.04. ~ ʼ23.12.02.	24	송욱건설㈜	입찰	완료
	남원하수처리장 탈수기 유기고본자응집제 조달 구입(1)	응집제 5,500kg	ʼ23.01.04. ~ ʼ23.02.03.	20	에스엔에프코리아	조달 계약	완료
하수도부	남원하수처리장 탈수기 유기고본자응집제 조달 구입(2)	응집제 6,000kg	ʼ23.04.22. ~ ʼ23.05.21.	21	에스엔에프코리아	조달 계약	완료
	남원하수처리장 탈수기 유기고본자응집제 조달 구입(3)	응집제 5,500kg	ʼ23.07.27. ~ ʼ23.08.26.	23	에스엔에프코리아	조달 계약	완료
	남원하수처리장 이산화염소발생기 약품 및 수리부품 구입	아큐사이드100A 2,500kg, 아큐사이드100B 2,000kg	ʼ23.03.20. ~ ʼ23.05.19.	20	㈜더존 이엔티	수의 계약	완료
	남원하수처리장 분배조 전동밸브 설치공사 관급자재 구입	전동밸브 및 신축관	ʼ23.08.27. ~ ʼ23.10.17.	28	주식회사 삼진정밀	조달 계약	완료
	남원하수처리장 중계 및 간이펌프장 준설공사	준설량 : 638.20㎥ 폐기물처리 : 124톤	ʼ23.04.04. ~ ʼ23.12.15.	113	마로건설(주)	입찰	완료
	남원하수처리장 반응조 수처리 감시제어반 제작설치 구입	반응조 수처리 감시제어반 1식	ʼ23.04.17. ~ ʼ23.07.14.	144	㈜대은계전	조달 계약	완료
	남원하수처리장 펌프장 수중오수펌프 구입	수중오수펌프 (SKTC7.5T,100mm,1.2㎥/min,17mH,7.5㎾)	ʼ23.09.07. ~ ʼ23.10.17.	47	한국펌프공업협동조합	수의 1인 견적	완료
	남원하수처리장 반응조 산기관보수공사 멤브레인 구입	미세기포 멤브레인 (Φ270㎜,900EA)	ʼ23.10.17. ~ ʼ23.11.10.	17	세인이엔씨(주)	수의 계약	완료
	성산2중계펌프장 차집관로 긴급복구공사	오수관로 205m, 포장복구 853㎡	ʼ23.08.29. ~ ʼ23.09.22.	172	하지산업(주)	수의 1인 견적	완료
	성산하수처리장 중앙감시제어반 조달구매설치	중앙모니터링제어시스템 등 1식	ʼ23.02.27. ~ ʼ23.07.17.	369	주식회사 대은계전	조달 계약	완료
	성산하수처리장 고온연소산화식 총유기탄소측정기 조달구입	고온연소산화식 총유기탄소측정기 1대	ʼ23.02.16. ~ ʼ23.04.17.	72	주식회사 에이치코비	조달 계약	완료
	성산하수처리장 슬러지원심탈수기 조달구입	슬러지원심탈수기 1대	ʼ23.02.03. ~ ʼ23.05.10.	203	㈜로얄정공	조달 계약	완료
	성산하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자응집제 조달구입(1)	유기고분자응집제 7,000kg	ʼ23.02.06. ~ ʼ23.02.17.	23	에스앤에프코리아주식회사	조달 계약	완료
	성산하수처리장 중계펌프장 시설물점검용 공용차량 조달구입	화물트럭 1톤롱바디카고 1대	ʼ23.03.07. ~ ʼ23.04.04.	31	광석	조달 계약	완료
	성산하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자응집제 조달구입(2)	유기고분자응집제 6,000kg	ʼ23.04.24. ~ ʼ23.04.27.	20	에스앤에프코리아주식회사	조달 계약	완료
하수도부	성산하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자응집제 조달구입(3)	유기고분자응집제 7,000kg	ʼ23.06.27. ~ ʼ23.07.07.	23	에스앤에프코리아주식회사	조달 계약	완료
	성산하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자응집제 조달구입(4)	유기고분자응집제 8,000kg	ʼ23.10.19. ~ ʼ23.11.02.	26	에스앤에프코리아주식회사	조달 계약	완료
	성산하수처리장 풋살구장 안전보호대 설치공사	안전보호대설치 1식	ʼ23.11.08. ~ ʼ23. 11.17	12	㈜무한씨앤스	수의 1인 견적	완료
	성산하수처리장 신천1간이펌프장 노후 오수펌프 교체공사	오수펌프 1대 교체	ʼ23.12.08. ~ ʼ23.12.10.	8	충남전기	수의 1인 견적	완료
현대화 추진단	2023년 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입(1차)	유기응집제 구입 1식	'23.01.05. ~ '23.03.24.	318	㈜에스 와이켐	조달 계약	완료
	제주하수처리장 탈취기약품(가성소다 4.7%) 단가구입	가성소다 구입 1식	'23.01.15. ~ '23.08.17.	82	마스터커머스	경쟁 입찰	완료
	제주하수처리장 탈취기약품(차아염소산나트륨) 단가구입	차아염소산나트륨 구입 1식	'23.01.18. ~ '23.09.30.	63	제주 수중모터펌프	경쟁 입찰	완료
	2023년 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입(2차)	유기응집제 구입 1식	'23.03.16. ~ '23.06.30.	335	㈜에스 와이켐	조달 계약	완료
	2023년도 하반기 제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 단가구입(7차)	저염기도 PAC 구입 1식	'23.05.02. ~ '23.08.17.	148	연평기프트	경쟁 입찰	완료
	공공하수처리시설 현대화사업추진단 업무 추진용 관용차량 구입	니로EV 1대 구입	'23.05.16. ~ '23.12.11.	51	기아 주식회사	조달 계약	완료
	2023년 제주특별자치도 상하수도본부 건설기계 25톤 덤프트럭 구입	덤프트럭 구입 1대	'23.06.14. ~ '23.06.28.	206	주식회사 대우트럭제주영업소	수의 계약	완료
	2023년 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 구입(3차)	유기응집제 구입 1식	'23.06.27. ~ '23.10.31.	193	에스엔에프 코리아	조달 계약	완료
	2023년도 제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 단가구입(8차)	저염기도 PAC 구입 1식	'23.06.29. ~ '23.10.31.	77	하귀올레	경쟁 입찰	완료
현대화 추진단	2023년 하반기 제주하수처리장 탈취기약품(가성소다4.7±0.2%) 단가구입	가성소다 구입 1식	'23.07.11. ~ '23.12.31.	100	러브미제이	경쟁 입찰	완료
	2023년 하반기 제주하수처리장 탈취기 약품(차아염소산나트륨) 단가구입	차아염소산나트륨 구입 1식	'23.07.12. ~ '23.12.31.	66	주식회사 대석기업	경쟁 입찰	완료
	2023년 제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 단가구입	저염기도 PAC 구입 1식	'23.09.05. ~ '23.12.31.	211	신제주스포츠	경쟁 입찰	완료
	제주하수처리장생물반응조정비공사수중펌프구입	수중펌프 구입 2대	'23.11.06. ~ '23.12.27.	37	한국펌프공업협동조합	수의 계약	완료
	제주하수처리장임시탈수시설용하수슬러지유기응집제조달구입	유기응집제 구입 1식	'23.09.27. ~ '23.12.28.	168	에스엔에프코리아	조달 계약	완료

□ 2024년

(단위 : 백만원)

구 분	공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약 상대자	계약 방법	추진상황
상수도부	2024년 상반기 수질검사 시약, 초자류 구매	시약, 초자류 204종 구매	ʼ24.03.27. ~ ʼ24.04.26.	149	탐라랩테크	제한 경쟁	완료
	수질검사실 실험용세척기 구입	실험용세척기 1식	ʼ24.06.07. ~ ʼ24.07.18.	36	제주드림 코리아	제한 경쟁	완료
	먹는물 미생물시험 소모품 구입	미생물시험 배지 등 5종	ʼ24.03.12. ~ ʼ24.05.13.	26	케이랩	수의 계약	완료
	하효지구 상수관로 정비공사	배수관로 D150mm L=0.96km	ʼ24.06.19. ~ ʼ24.10.16.	484	㈜덕운건설	제한 경쟁	추진중 (50%)
	교래지구 대체취수원(6호공) 개발공사	취수원(1,000㎥/일) 개발 1식	ʼ24.06.26. ~ ʼ25.02.20.	549	㈜웅지산업개발	제한 경쟁	추진중 (20%)
	교래지구 대체취수원(5호공) 개발공사	취수원(1,000㎥/일) 개발 1식	ʼ24.06.26. ~ ʼ25.02.20.	580	㈜용산기술	제한 경쟁	추진중 (20%)
	서홍지구 상수관로 정비공사	배수관로 D300~400mm L=0.96km	ʼ24.06.19. ~ ʼ24.12.15.	812	㈜대석건설	제한 경쟁	추진중 (60%)
	동홍지구 상수관로 정비공사	송‧배수관로 D400~500mm L=1.75km	ʼ24.06.19. ~ ʼ25.02.13.	1,533	㈜신창토건	제한 경쟁	추진중 (45%)
	광평지구 대체취수원(2호공) 개발공사	취수원(700㎥/일) 개발 1식	ʼ24.06.25. ~ ʼ25.02.19.	755	㈜진산	제한 경쟁	추진중 (20%)
	광평지구 대체취수원(1호공) 개발공사	취수원(700㎥/일) 개발 1식	ʼ24.06.25. ~ ʼ25.02.19.	758	㈜연웅 이앤씨	제한 경쟁	추진중 (15%)
	원인자부담금(화북상업지구) 배수지 시설공사	배수지(V=2,800톤) 1지 증설	ʼ24.07.15. ~ ʼ25.07.14.	2,284	지성종합 건설(주)	제한 경쟁	추진중 (5%)
	와산지구 배수지 계장제어장치 제작 설치	TN/TC반 1개소 설치	ʼ24.03.06. ~ ʼ24.05.07.	32	(주)아진	일반 경쟁	완료
	남원 및 하례지구 지하수관정 제어반 제작설치	기동반 2개소 설치	ʼ24.03.05. ~ 24.05.08.	87	윤성제어 기술(주)	일반 경쟁	완료
	원인자부담금(하귀1리) 상수도 시설공사	상수도관(D150) L=0.9㎞	ʼ24.08.19. ~ ʼ25.02.14.	312	㈜나비건설	제한 경쟁	추진중 (자재구입 중)
	강정정수장 현대화사업 소방공사	정수장 현대화 (25,000㎥/일) 소방공사 1식	ʼ24.01.09. ~ ʼ27.01.07.	274	㈜광동전력	제한 경쟁	추진중 (토목공사 중)
	강정정수장 현대화사업 정보통신공사	정수장 현대화 (25,000㎥/일) 정보통신공사 1식	ʼ24.01.11. ~ ʼ27.01.09.	251	쓰리 에스텍㈜	제한 경쟁	추진중 (토목공사 중)
	강정정수장 현대화사업 전기공사	정수장 현대화 (25,000㎥/일) 전기공사 1식	ʼ24.01.12. ~ ʼ27.01.10.	3,865	㈜성원 이앤지	제한 경쟁	추진중 (토목공사 중)
	2024년 상수도 소독약품 (정제소금) 단가구입	정제소금 구입 1식	ʼ24.01.16. ~ ʼ24.12.31.	93	알파유통㈜	제한 경쟁	추진중 (58%)
	강정정수장 현대화사업 계장제어시스템 제작설치 조달구입	계장제어시스템 제작설치 1식	ʼ24.03.15. ~ ʼ27.01.31.	1,206	(주)대은계전	조달 계약	추진중 (토목공사 중)
상수도부	토평정수장 고도정수처리시설사업 계장제어시스템 제작설치 조달구입	계장제어시스템 제작설치 1식	ʼ24.03.20. ~ ʼ26.01.31.	417	한국유체 기술㈜	조달 계약	추진중 (토목공사 중)
	상수도생산관리과 관용차량(포터Ⅱ) 조달 구입	관용차량(포터) 구입 1식	ʼ24.03.25. ~ ʼ24.04.25.	22	현대자동차㈜	수의 계약	완료
	2024년 지하수 예비용 수중모터 구입	수중모터 구입 1식	ʼ24.04.11. ~ ʼ24.06.14.	197	㈜화성펌프 기전	제한 경쟁	완료
	유수암정수장 차염소독설비 교체설치	차염소독설비 교체 설치 1식	ʼ24.06.10. ~ ʼ24.08.29.	302	㈜제이텍 워터	조달 계약	완료
	소규모 수도시설 (성산지구) 개량공사	상수도시설공사 L=1.52km	ʼ24.06.24. ~ ʼ24.10.23.	249	(주)한국관정컨설턴트	제한 경쟁	추진중 (55%)
	소규모 수도시설 (안덕지구) 개량공사	상수도시설공사 L=3.17km	ʼ24.06.25. ~ ʼ24.12.21.	664	(주)성지건설	제한 경쟁	추진중 (10%)
	외도수원지 외 2개소 노후 송수펌프 제작 설치 조달구입	송수펌프 제작 설치 1식	ʼ24.06.25. ~ ʼ24.12.21.	320	신신 이엔지㈜	제한 경쟁	추진중 (40%)
	농어촌생활용수 급수취약지역(애월지구) 상수도 시설공사	상수도시설공사 L=2.43km	ʼ24.06.25. ~ ʼ24.12.24.	462	(주)아지건설	제한 경쟁	추진중 (10%)
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 막여과 공법자재 조달구입	해수담수화 막여과 공법자재 (1,500㎥/일)	ʼ24.06.26. ~ ʼ26.06.25.	3,957	㈜청아 이엔지	조달 계약 (수의)	추진중 (토목공사 중)
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	해수담수화시설 개량 (1,500㎥/일), 증설 (1,500㎥/일)	ʼ24.06.27. ~ ʼ26.06.26.	8,094	(주)지원건설	제한 경쟁	추진중 (토목공사 중)
	농어촌생활용수 급수취약지역 (조천, 구좌지구) 상수도 시설공사	상수도시설공사 L=2.61km	ʼ24.06.27. ~ ʼ24.12.23.	467	(주)도경건설	제한 경쟁	추진중 (5%)
	농어촌생활용수 급수취약지역(한림지구) 상수도 시설공사	상수도시설공사 L=3.72km	ʼ24.06.27. ~ ʼ24.12.23.	580	세풍건설(주)	제한 경쟁	추진중 (3%)
	소규모 수도시설 (남원지구) 개량공사	상수도시설공사 L=1.09km	ʼ24.06.28. ~ ʼ24.10.25.	221	(주)예성건설	제한 경쟁	추진중 (65%)
	소규모 수도시설 (대정지구) 개량공사	상수도시설공사 L=1.32km	ʼ24.06.28. ~ ʼ24.10.25.	261	(주)두진건설	제한 경쟁	추진중 (40%)
	소규모 수도시설 (표선지구) 개량공사	상수도시설공사 L=1.05km	ʼ24.07.01. ~ ʼ24.10.28.	301	세운건설(주)	제한 경쟁	추진중 (35%)
	농어촌생활용수 급수취약지역(한경지구) 상수도 시설공사	상수도시설공사 L=1.06km	ʼ24.07.01. ~ ʼ24.10.28.	271	(주)남현건설	제한 경쟁	추진중 (35%)
	농어촌생활용수 급수취약지역(우도지구) 상수도 시설공사	상수도시설공사 L=1.37km	ʼ24.07.08. ~ ʼ24.11.04.	268	법윤토건(주)	제한 경쟁	추진중 (50%)
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 전기공사	해수담수화시설 개량 및 증설 전기공사 1식	ʼ24.07.15. ~ ʼ26.07.14.	1,997	(주)광훈전력	제한 경쟁	추진중 (토목공사 중)
상수도부	노후 정수장(별도봉) 개량사업 비상발전기실 설치공사	비상발전기실 설치 1식	ʼ24.07.15. ~ ʼ25.01.10.	516	(주)제이에이치건설	제한 경쟁	추진중 (5%)
	2024년 강정정수장 정밀 여과장치 마이크로필터 구매	마이크로필터 구입 1식	ʼ24.05.16. ~ ʼ26.06.11.	27	일신기계 공업㈜	제한 경쟁	완료
	남원읍 남원리 감압밸브 설치공사	감압밸브 설치 8개소	ʼ24.01.08. ~ ʼ24.05.26.	114	(주)동현	제한 경쟁	완료
	남원읍 남원리 누수관 교체공사	배수관로 D35~150mm, L=530m	ʼ24.01.08. ~ ʼ24.05.06.	133	다인건설(주)	제한 경쟁	완료
	2023년 남원대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 200개소	ʼ24.01.12. ~ ʼ24.07.09.	177	(주)웅지산업개발	제한 경쟁	완료
	2023년 표선대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 200개소	ʼ24.01.12. ~ ʼ24.07.09.	177	윤우건설(주)	제한 경쟁	완료
	2024년 성산대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 200개소	ʼ24.02.28. ~ ʼ24.12.23.	197	세희건설(주)	제한 경쟁	추진중 (75%)
	2024년 애월대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 200개소	ʼ24.02.28. ~ ʼ24.12.23.	196	제주 동부건설(주)	제한 경쟁	추진중 (75%)
	2024년 애월대블록 누수처 복구공사(2차)	누수처 복구 200개소	ʼ24.07.23. ~ ʼ25.05.18.	193	세영토건(주)	제한 경쟁	추진중 (20%)
	2024년 표선대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 200개소	ʼ24.08.01. ~ ʼ25.01.27.	194	중원건설(주)	제한 경쟁	추진중 (30%)
	2024년 남원대블록 누수처 복구공사	누수처 복구 200개소	ʼ24.08.05. ~ ʼ25.01.31.	195	명부건설(주)	제한 경쟁	추진중 (30%)
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구) 24년	압송관로 관보호공 L=8m 중계펌프장 1개소 개량	ʼ24.01.01. ~ ʼ24.12.31.	137	㈜천마 종합건설	제한 경쟁	추진중 (98%)
	성산3 하수관로 정비공사(1공구) 22년 시행분	오수관로 L=4km 배수설비 76가구	ʼ24.01.10. ~ ʼ24.12.15.	2,403	동남 종합건설(합)	제한 경쟁	추진중 (49%)
	성산3 하수관로 정비공사(2공구) 22년 시행분	오수관로 L=2.16km 배수설비 104가구	ʼ24.01.22. ~ ʼ24.12.31.	3,251	영보건설(주)	제한 경쟁	추진중 (84%)
	성산3 하수관로 정비공사(3공구) 22년 시행분	오수관로 L=286m 배수설비 135가구	ʼ24.01.22. ~ ʼ24.12.15.	1,500	세기건설(주)	제한 경쟁	추진중 (60%)
	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구)	차집관로 정비 5.05㎞	ʼ23.06.22. ~ ʼ26.06.21.	4,600	세호 종합건설(주)	제한 경쟁	추진중 (5%)
	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(월류수처리시설)	월류수처리시설 2개소	ʼ23.11.30. ~ ʼ25.05.30.	1,538	(주)청봉환경	제한 경쟁	추진중 (33%)
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 1공구 24년 시행분	오수관로 L=58m 배수설비 38가구	ʼ23.12.11. ~ ʼ24.10.18.	240	주식회사 도현종합건설	제한 경쟁	완료
하수도부	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 2공구 24년 시행분	오수관로 L=542m 배수설비 94가구	ʼ23.12.11. ~ ʼ24.09.23.	1,240	주식회사 천마종합건설	제한 경쟁	추진중 (93%)
	서귀포 예래대륜 하수관로정비사업(2단계) 1공구 서호처리분구 24년 시행분	오수관로 L=18m 배수설비 78가구	ʼ24.08.27. ~ ʼ25.03.24.	979	주식회사 연수종합건설	제한 경쟁	추진중 (1%)
	서귀포 중문관광단지 하수관로정비공사(1공구) 24년 시행분	오수관로 L=603m, 펌프장 신설 1식	ʼ24.01.03. ~ ʼ24.11.17.	1,259	(주)대웅건설	제한 경쟁	추진중 (67%)
	서귀포 중문관광단지 하수관로정비사업(2공구) 24년 시행분	NATM L=228m	ʼ23.01.03. ~ ʼ24.12.28.	5,303	원진 종합건설(주)	일반 경쟁	추진중 (94%)
	서귀포 중문관광단지 하수관로정비 전기및계측제어공사 24년 시행분	전기및계측제어 1식	ʼ23.01.03. ~ ʼ24.11.17.	257	(주)유영	제한 경쟁	추진중 (83%)
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업(전기 및 계측제어) 자재(계장제어시스템) 구입	계장제어장치 1식	ʼ24.03.27. ~ ʼ24.08.24.	191	(주)정우계전	제한 경쟁	완료
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사(3차분)	맨홀펌프장 4개소	ʼ24.01.17. ~ ʼ24.07.31. (ʼ23.07.04. 공사일시정지)	308	금성 종합건설(주)	제한 경쟁	일시정지중 (70%)
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사 자재(GRP맨홀펌프장) 구입	맨홀박스 6개	ʼ24.04.12. ~ ʼ24.08.31.	148	㈜경남 바이오	일반 경쟁	완료
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사 전기 및 계측제어공사 자재(계장제어시스템) 구입	계장제어장치 1식	ʼ24.06.18. ~ ʼ24.09.30.	125	보타리에너지(주)	제한 경쟁	일시정지중 (70%)
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사 자재(수중펌프) 구입	수중펌프 1식	ʼ24.04.26. ~ ʼ24.06.15.	104	한국이엔지	일반 경쟁	완료
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업 (2단계) 1공구 24년 시행분	하수관로 L=0.51㎞ 배수설비 56가구	'23.12.11. ~ '24.08.10.	896	성림건설㈜	제한 경쟁	추진중 (93%)
	안덕면 광평리 배수설비 정비공사	하수관로 L=0.1㎞ 배수설비 4가구	'24.04.02. ~ '24.06.30.	146	반올림건설㈜	제한 경쟁	완료
	제주서부공공하수처리시설 증설공사 (24년 시행분)	처리장 증설 20,000㎥/일	ʼ24.01.02. ~ ʼ24.12.25.	8,137	부건종합건설 주식회사	일반 경쟁	추진중 (62%)
하수도부	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업 전기공사 (24년 시행분)	전기공사 1식	ʼ24.01.02. ~ ʼ24.12.25.	700	지성전력(주)	제한 경쟁	추진중 (41%)
	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업 계측제어공사 (24년 시행분)	계측제어공사 1식	ʼ24.01.02. ~ ʼ24.12.25.	109	㈜보성기업	제한 경쟁	추진중 (-%)
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	호퍼 2EA 호이스트 2EA 용해장치 1EA	'24.01,31. ~ '24.12.30.	399	제이케이 이엔씨(주)	조달 계약 (지명 경쟁)	추진중 (10%)
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	자외선소독기	'24.03.07. ~ '24.12.31.	294	㈜에코원 터크놀로지	조달 계약 (자재선정위원회)	추진중 (90%)
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	원심탈수기 3대	'24.01.18. ~ '25.06.30.	871	이화에코 시스템	조달 계약 (자재선정위원회)	추진중 (50%)
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	반출컨베이어	'24.02.21. ~ '24.12.30.	1,380	㈜가온텍	조달 계약 (자재선정위원회)	추진중 (90%)
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	사일로	'24.04.18. ~ '24.12.30.	543	㈜보은정공	일반 경쟁	추진중 (30%)
	제주서부공공하수처리장 증설사업 관급자재	처리수 배출장치	'24.06.20. ~ '24.12.17.	2,656	㈜상원 이엔씨	조달 계약 (자재선정위원회)	추진중 (50%)
	제주하수처리구역(도남·건입동)차집관로 정비공사 24년 시행분	차집관로 0.237km	'24.06.10. ~ '24.11.09.	550	㈜일호종합 건설	제한 경쟁	추진중 (-%)
	오라·아라 하수관로 정비사업(3공구) 시행분	오수관정비 L=1.5km, 배수설비 195가구	ʼ24.02.01. ~ ʼ24.10.30.	2,029	이수 종합건설(주)	제한 경쟁	추진중 (95%)
	제주시 우도 하고수동 소규모 하수관로 정비공사	오수관정비 L=0.181km	'24.04.17. ~ '24.08.14. (공사중지)	123	지안건설(주)	소액 수의	추진중 (90%)
	제주시 연동 소규모 하수관로 정비공사	오수관 L=60m, 배수설비 20가구	'24.03.19. ~ '24.07.16.	216	진형건설(주)	일반 입찰	추진중 (10%)
	월정공공하수처리시설 증설사업(2차분)	하수처리장 증설 (12,000톤/일)	'24.03.28. ~ '24.12.28.	2,395	㈜대저건설	일반 경젱	추진중 (31%)
	월정공공하수처리시설 증설사업 전기공사(4차분)	전기공사 1식	'24.03.04. ~ '24.12.31.	220	㈜새론	일반 경쟁	추진중 (5%)
	월정공공하수처리시설 증설사업 통신공사	통신공사 1식	'24.04.01. ~ '25.09.12.	68	㈜정우계전	일반 경쟁	추진중 (5%)
하수도부	월정공공하수처리시설 증설사업 소방공사	소방공사 1식	'24.04.02. ~ '25.09.23.	176	동우설비(주)	일반 경쟁	추진중 (5%)
	조천처리분구 하수관로 정비사업(1공구) 24년 시행분	오수관로 L=2.4km	ʼ24.02.13 ~ ʼ24.10.13	549	청도종합건설주식회사	제한 경쟁	추진중 (70%)
	화북, 삼양지역 하수펌프장 불명수(해수) 유입 맨홀 및 관로 보강공사	관로 보강 45개소, 맨홀 보강 20개소	ʼ24.02.22. ~ ʼ24.08.28.	159	세진환경건설(주)	제한 경쟁	완료
	제주시 동지역 차집관로(다호마을) 개량공사	압송관로 D150mm, L=767m 신설 1식	ʼ24.02.26. ~ ʼ24.05.27.	164	(유)선두수자원개발	제한 경쟁	완료
	제주시 동지역 하수펌프장 수중펌프 구입	수중펌프 구입 10대	ʼ24.04.24. ~ ʼ24.06.13.	66	㈜오비스	조달 계약	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달 구입	유기응집제 5,000Kg	ʼ24.01.17. ~ ʼ24.02.16.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달 구입(2)	유기응집제 5,000Kg	ʼ24.02.13. ~ ʼ24.03.14.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동부하수처리장 무기응집제(황산알루미늄) 단가구입	황산알루미늄 200,000L	ʼ24.02.23. ~ ʼ24.12.31.	84	엠엔케이컴퍼니	입찰	추진중 (49%)
	동부하수처리장 간이펌프장 전동기 제어반 제작 설치 조달 구입	전동기제어반 제작·설치 4식	ʼ24.03.11. ~ ʼ24.07.06.	79	㈜정우계전	조달 계약	완료
	동부하수처리장 반응조 MLSS 계측기 구입	MLSS 계측기 3개	ʼ24.04.02. ~ ʼ24.06.01.	33	주식회사 우정상사	입찰	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달 구입(3)	유기응집제 5,000Kg	ʼ24.04.08. ~ ʼ24.05.08.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달 구입(4)	유기응집제 5,000Kg	ʼ24.05.16. ~ ʼ24.06.15.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동부하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달 구입(5)	유기응집제 5,000Kg	ʼ24.07.12. ~ ʼ24.08.11.	21	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	동부하수처리장 반응조(3지) 산기관 멤브레인 교체 공사	산기관 멤브레인 교체 1식	ʼ24.06.05. ~ ʼ24.07.02.	41	정호건설 주식회사	수의 계약	완료
	2024년 서부하수처리장 탈취제(차아염소산나트륨) 단가구입	차아염소산나트륨 50톤	ʼ24.01.10. ~ ʼ24.12.31.	28	재인	경쟁 입찰	추진중 (75%)
	2024년 서부하수처리장 탈취제(가성소다25%) 단가구입	가성소다 65톤	ʼ24.01.11. ~ ʼ24.12.31	36	㈜제주클린산업	경쟁 입찰	추진중 (75%)
	2024년 서부하수처리장 무기응집제(황산알루미늄) 단가구입	황산알루미늄 380톤	ʼ24.01.17. ~ ʼ24.12.31.	155	재인	경쟁 입찰	추진중 (68.8%)
하수도부	서부하수처리장 산기관 교체공사 관급자재 구입	산기관 자재 1식	ʼ24.03.18. ~ ʼ24.05.14.	110	㈜고려산업	조달	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ24.01.12. ~ ʼ24.02.11.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ24.02.13. ~ ʼ24.03.15.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ24.03.04. ~ ʼ24.04.03.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ24.04.02. ~ ʼ24.05.02.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ24.05.02. ~ ʼ24.06.01.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ24.05.31. ~ ʼ24.06.30.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ24.07.03. ~ ʼ24.08.02.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입(1)	응집제 8,000Kg	ʼ24.08.12. ~ ʼ24.09.11.	29	(주)에스와이켐	조달 계약	완료
	서부하수처리구역 곽지~금성중계펌프장 간 차집관로 긴급 복구공사	차집관로 긴급 복구 L=108m(D600mm)	ʼ24.03.19. ~ ʼ24.04.02.	293	주식회사 지운	수의 계약	완료
	서부하수처리장 산기관 교체공사	산기관 교체 1식	ʼ24.03.25. ~ ʼ24.06.11.	128	백연건설(주)	경쟁 입찰	완료
	도서지역 소규모 공공하수처리시설 스마트 통합원격관리시스템 구축사업 프로세스제어반 제작구매설치	프로세스제어반 1식	ʼ24.01.29. ~ ʼ25.01.18.	5,198	마인드원 주식회사	제한 경쟁	추진중 (15%)
	제주시 서부위생처리장 협잡물처리기 구입	협잡물처리기 구입 1식	ʼ24.01.18. ~ ʼ24.05.16.	222	동진기공	조달 구매	완료
	보목하수처리장 분리막 교체 제작·설치	분리막(카트리지) 교체 제작·설치 1식	ʼ24.01.24. ~ ʼ24.02.23.	940	주식회사 에코니티	조달 계약	완료
	색달하수처리장 유입동 노후 MCC반 교체공사 관급자재 구입	MCC반 6면 제작 설치	ʼ24.06.07. ~ ʼ24.10.01.	97	주식회사 대은계전	조달 계약	추진중 (80%)
	색달하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달 구입	유기응집제 구입 1식	ʼ24.06.21. ~ ʼ24.07.05.	24	에스앤에프코리아(주)	조달 계약	완료
	색달하수처리장 슬러지 응집용 유기응집제 조달 구입	유기응집제 구입 1식	ʼ24.08.05. ~ ʼ24.08.20.	24	에스앤에프코리아(주)	조달 계약	완료
	제주(대정)하수처리장 생물반응조 터보 송풍기 제작 구입	송풍기 1대 제작구입	ʼ24.03.05. ~ ʼ24.08.16.	127	㈜새한공조	조달 계약	완료
하수도부	대정하수처리장 분배조 개선공사	분배조 개선 1식	ʼ24.06.19. ~ ʼ24.09.16.	100	기품토건(주)	경쟁 입찰	추진중 (50%)
	대정하수처리장 중계펌프장 자중강하수문용 전동구동장치 교체	자중강하수문용 액추에이터 3대	ʼ24.04.11. ~ ʼ24.08.06.	208	㈜세웅냉동설비	경쟁 입찰	완료
	남원하수처리장 탈수기 유기고분자응집제 조달 구입	응집제 7,000kg	ʼ24.05.08. ~ ʼ24.05.17.	25	에스엔에프코리아	조달 계약	완료
	남원하수처리장 분배조 정비공사	분배조 정비공사 1식	ʼ24.04.26. ~ ʼ24.08.09.	86	금진기업(주)	입찰	완료
	남원하수처리장 중계 및 간이펌프장 준설공사	준설량 : 595.70㎥ 폐기물처리 : 116톤	ʼ24.05.29. ~ ʼ24.11.30.	119	충남건설(주)	입찰	추진중 (46%)
	남원하수처리장 남원11중계펌프장 제진기 구매	제진기 1대 (1000*1600)	ʼ24.05.24. ~ ʼ24.09.17.	62	(주)에싸	조달 계약	추진중 (50%)
	성산2중계 노후 차집관로 긴급 복구공사	긴급복구공사 1식	ʼ24.04.18. ~ ʼ24.05.21.	117	하지산업(주)	수의 1인 견적	완료
	2024년 성산하수처리장 및 중계펌프장 준설공사	준설공사 1식	ʼ24.05.07. ~ ʼ24.06.03.	15	주식회사 주현건설	수의 1인 견적	완료
	성산하수처리장 탈취설비 바이오필터 교체공사	바이오필터교체 1식	ʼ24.05.20. ~ ʼ24.08.17.	175	주식회사 장우	경쟁 입찰	완료
	성산하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자응집제 조달구입	유기응집제 구입 1식	ʼ24.02.13. ~ ʼ24.03.05.	26	에스앤에프코리아주식회사	조달 구매	완료
	성산하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자응집제 조달구입(5월)	유기응집제 구입 1식	ʼ24.05.09. ~ ʼ24.05.22.	23	에스앤에프코리아주식회사	조달 구매	완료
	성산하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자응집제 조달구입(7월)	유기응집제 구입 1식	ʼ24.07.25. ~ ʼ24.08.13.	23	에스앤에프코리아주식회사	조달 구매	완료
	2024년 성산하수처리장 펌프장 오수펌프 구입	펌프 5대 구입	ʼ24.07.03. ~ ʼ24.08.30.	34	한국펌프공업협동조합	수의 1인 견적	완료
현대화 추진단	2024년 제주하수처리장 탈취기 약품(가성소다4.7±0.2%) 단가구입	가성소다 구입 1식	'24.01.08. ~ '24.05.20.	48	투비전스토어	경쟁 입찰	완료
	2024년 제주하수처리장 탈취기약품(가성소다 4.7±0.2%) 단가구입(2차분)	가성소다 구입 1식	'24.04.25. ~ '24.08.21.	22	주식회사 세아엘로힘	경쟁 입찰	완료
	2024년 제주하수처리장 탈취기약품(차아염소산나트륨) 단가구입	차아염소산나트륨1식	'24.01.10. ~ '24.12.31.	55	이오	경쟁 입찰	추진중
현대화 추진단	2024년제주하수처리장탈취기약품(가성소다4.7±0.2%)단가구입(3차분)	가성소다 구입 1식	'24.07.17. ~ '24.12.31.	30	월정이엔씨	경쟁 입찰	추진중
	2024년도 제주하수처리장 유기응집제 조달 구입(1차)	유기응집제 구입 1식	'24.01.04. ~ '24.05.20.	409	에스엔에프코리아 주식회사	조달 계약	완료
	제주하수처리장유기응집제조달구입(2차)	유기응집제 구입 1식	'24.05.17. ~ '24.08.21.	329	에스엔에프코리아 주식회사	조달 계약	완료
	제주하수처리장유기응집제조달구입(3차)	유기응집제 구입 1식	'24.07.31. ~ '24.12.31.	342	에스엔에프코리아 주식회사	조달 계약	추진중
	2024년 제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 단가구입	저염기도PAC 구입 1식	'24.01.17. ~ '24.12.31.	176	신제주스포츠	경쟁 입찰	추진중

22. 각종 공사 설계변경 현황(100백만원 이상)

□ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분	연도	건 수	사업비	설계변경	증감	비고
총 계	2023	84	234,774	256,205	21,431
	2024	30	131,026	132,764	1,738
상수도부	2023	40	27,043	28,875	1,832
	2024	4	684	677	△7
하수도부	2023	44	207,731	227,330	19,599
	2024	26	130,342	132,087	1,745

□ 2023년

(단위 : 백만원)

구 분	공 사 명	사업비	사업기간	설계변경			증감	변경사유
				1차	2차	3차
상수도부	애월정수장 고도정수처리 시설사업(전기)	808	ʼ21.12.22. ~ ʼ23.12.19.	934			126	- 물가변동에 따른 계약금액 조정 및 추가 베관 배선 반영, 주공종에 맞춰 공기 연장
	표선지구 배수지 시설공사	924	ʼ22.05.03. ~ ʼ23.02.05.	931	-	-	7	- 시스템비계 재설치 물량(102㎡) 및 펜스, 플륨관 등 물량 감소
	고다시지구 배수지 확장공사	1,429	ʼ22.06.03. ~ ʼ23.12.09.	1,367	1,409	-	△20	- 터파기 암 물량 및 아스콘, 콘크리트 포장 물량 반영
	애월정수장 고도정수처리 시설사업	4,691	ʼ22.01.06. ~ ʼ23.12.19.	5,871	6,512	-	1,821	- 레미콘 파업에 따른 공기연장과 도수관로 선형변경과 공공하수관로 연결 등 현장여건 반영
	교래지구 취수원(1호공) 개발사업	563	ʼ23.03.22 ~ ʼ23.11.26	565	-	-	2	- 우물자재설치 물량 (450m → 384m)감소 및 sus파이프 2본 추가 설치
	교래지구 취수원(2호공) 개발사업	564	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.11.26.	572	-	-	8	- 우물자재설치 물량 (450m→384m)감소 및 sus파이프 2본 추가 설치
	교래지구 취수원(3호공) 개발사업	555	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.11.26.	556	-	-	1	- 우물자재 설치 물량(440m→402m)감소 및 sus파이프 2본 추가 설치
	교래지구 취수원(4호공) 개발사업	550	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.11.26.	551	-	-	1	- 우물자재 설치 물량(440m→348m)감소 및 sus파이프 2본 추가 설치
	원인자부담금(구좌농공단지) 상수도 시설공사	487	ʼ23.04.10. ~ ʼ23.10.18.	499			12	- 폭염과 강우에 따른 공기연장, 터파기 물량 변동 등
	원인자부담금(외도이동) 상수도 시설사업	383	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.14.	366			△17	- 터파기 암, 포장공사 물량변동 반영
	원인자부담금(용담이동) 상수도 시설공사	258	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.14.	257			△1	- 유수률 제고를 위한 신설구간 노후관 교체 및 현장 실정에 맞게 반영.
	와산지구 상수도 시설공사	815	ʼ23.05.23. ~ ʼ24.04.16.	815	859		44	- 터파기 암 물량 감소, 철근 물량 조정 및 안전관리계획, 점검비 반영
	하례지구 대체취수원 개발사업	368	ʼ23.05.24. ~ ʼ23.11.19.	346	-	-	△22	- 우물자재설치 물량 (280m→201m)감소
상수도부	남원지구 대체취수원 개발사업	217	ʼ23.05.24. ~ ʼ23.11.19.	212	-	-	△5	- 우물자재설치 물량 (110m→98.5m)감소
	교래지구 도수관로 시설공사	587	ʼ23.06.14. ~ ʼ23.12.19.	587	561		△26	- 터파기 암 물량 및 콘크리트 포장 물량 감소
	동홍지구 배수지 확충공사(1차분)	1,798	ʼ23.06.21. ~ ʼ24.02.27.	1,797	-	-	△1	- 현장 여건에 맞게 물량 조정(관급자재 내부방수 1차분 시공)
	동홍지구 배수지 확충공사(전체분 및 1차분)	1,798	ʼ23.06.21. ~ ʼ24.01.16.	1,797			△1	- 터파기 암 물량 및 옥상마감 시공 변경에 따른 물량 조정
	교래지구 도수관로 시설공사 전기공사	335	ʼ23.07.27. ~ ʼ24.02.17.	351			16	- 설계 물량 누락분 반영 등
	표선지구 배수지 시설공사	925	ʼ22.05.03. ~ ʼ23.02.05.	931			6	- 현장 여건에 맞게 물량 조정
	어승생정수장(서부간선) 송수관로 긴급복구공사	476	'23.03.06. ~ '23.07.03.	453			△23	- 방호석 헐기 및 놓기 : 당초(691개) → 변경(0개) - 보호콘크리트 타설 : 당초(0㎥) → 변경(28㎥) - 통신관로(D50mm) 이설 : 당초(0m) → 변경(1,700m) - 기층포장 : 당초(547㎡) → 변경(432㎡), 표층포장 : 당초(193㎡) → 변경(142㎡) - 터파기(연암) : 당초(1,978㎥) → 변경(1,114㎥)
	서귀포시 상예수원지 취수량 급감에 따른 긴급 상수도 관로 연결공사	161	'23.03.27. ~ '23.05.25.	152			△9	- KP접합부설 : 당초(0개소) → 변경(8개소) - 이형관부설(D100) : 당초(0개소) → 변경(8개소) - 터파기(토사) : 당초(646㎥) → 변경(776㎥) - 터파기(연암) : 당초(162㎥) → 변경(32㎥)
	농어촌생활용수 급수취약지역(대정지구) 상수도시설공사	157	'23.04.04. ~ '23.09.30.	155			△2	- 아스콘포장(기층) : 당초(54톤) → 변경(39톤) - 레미콘 타설 : 당초(145㎥) → 변경(113㎥) - 개인전 교체 : 당초(16개소) → 변경(19개소) - 터파기(토사) : 당초(510㎥) → 변경(216㎥) - 터파기(연암) : 당초(182㎥) → 변경(326㎥)
상수도부	소규모 수도시설(남원지구) 상수도시설공사	177	'23.04.06. ~ '23.10.02.	157			△20	- 개인전교체 : 당초(2개소) → 변경(0개소) - 기층포장 : 당초(400톤) → 변경(366톤) - 표층포장 : 당초(158톤) → 변경(156톤) - 터파기(연암) : 당초(196㎥) → 변경(125㎥)
	농어촌생활용수 급수취약지역(애월지구) 상수도시설공사	716	'23.04.07. ~ '23.12.07.	687			△29	- 내충격 수도관(D100mm) 부설 및 접합 : 당초(0본) → 변경(261본) - 감압밸브(D150mm) 설치 : 당초(2개소) → 변경(1개소) - 보행매트 깔기 : 당초(3,170㎡) → 변경(2,278㎡) - 기층포장 : 당초(888톤) → 변경(592톤), 표층포장 : 당초(619톤) → 변경(711톤) - 터파기(연암) : 당초(1,221㎥) → 변경(1,059㎥)
	농어촌생활용수 급수취약지역(한림지구) 상수도시설공사	254	'23.04.07. ~ '23.10.03.	223			△31	- 콘크리포장 : 당초(86㎥) → 변경(76㎥) - 아스콘포장(표층) : 당초(61톤) → 변경(55톤) - 아스콘포장(기층) : 당초(85톤) → 변경(76톤) - 터파기(토사) : 당초(1,080㎥) → 변경(1,369㎥) - 터파기(연암) : 당초(401㎥) → 변경(0㎥)
	소규모 수도시설(우도지구) 상수도시설공사	277	'23.04.12. ~ '23.10.08.	284			7	- 아스콘포장(표층) : 당초(135톤) → 변경(120톤) - 레미콘(기층) : 당초(186㎥) → 변경(126㎥) - 터파기(토사) : 당초(496㎥) → 변경(400㎥) - 터파기(연암) : 당초(231㎥) → 변경(266㎥) - 터파기(연암, 무진동) : 당초(0㎥) → 변경(33㎥)
	농어촌생활용수 급수취약지역 (구좌지구) 상수도시설공사	324	'23.04.14. ~ '23.10.10.	345			21	- 아스콘포장(기층) : 당초(174톤) → 변경(124톤) - 아스콘포장(표층) : 당초(140톤) → 변경(80톤) - 우수받이연결 : 당초(0개소) → 변경(11개소)
	소규모 수도시설(표선지구) 상수도시설공사	449	'23.04.18. ~ '23.10.14.	416			△33	- 아스콘포장(기층) : 당초(514톤) → 변경(429톤) - 개인전 교체 : 당초(56개소) → 변경(25개소) - 터파기(토사) : 당초(938㎥) → 변경(984㎥) - 터파기(연암) : 당초(432㎥) → 변경(346㎥)
상수도부	소규모 수도시설 (성산지구) 상수도시설 공사	490	'23.04.14. ~ '23.10.10.	485			△5	- 콘크리트포장 : 당초(82톤) → 변경(179톤) - 아스콘포장(기층) : 당초(673톤) → 변경(427톤) - 아스콘포장(표층) : 당초(605톤) → 변경555톤) - 우수받이연결 : 당초(49개소) → 변경(54개소)
	소규모 수도시설 (조천지구) 상수도시설 공사	425	'23.04.17. ~ '23.12.17.	400			△25	- 콘크리트포장 : 당초(450톤) → 변경(389톤) - 터파기(토사) : 당초(1,295㎥) → 변경(1,176㎥) - 터파기(연암) : 당초(526㎥) → 변경(529㎥)
	농어촌생활용수 급수취약지역 (한경지구) 상수도시설공사	587	'23.05.04. ~ '23.12.29.	575			△12	- 콘크리트포장 : 당초(12톤) → 변경(0톤) - 터파기(토사) : 당초(2,207㎥) → 변경(2,589㎥) - 터파기(연암) : 당초(1,092㎥) → 변경(9,16㎥)
	노후정수장(월산) 개량사업 정밀여과장치 설치공사	240	'23.07.28. ~ '23.11.24.	244			4	- 제수밸브(D600) : 당초(2개) → 변경(0개) - 상수관로 부설 : 당초(102m) → 변경(83m) - 콘크리트포장 : 당초(87톤) → 변경(152톤) - 잔디식재 : 당초(0㎡) → 변경(69㎡)
	한림한경 소규모 유량수압 감시시스템 구축사업	408	ʼ23.04.11. ~ ʼ23.10.07.	391			△17	- 현장 여건에 맞게 물량 조정
	김녕사굴지구 상수관로 개선공사	185	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.08.20.	192			7	- 민원으로 인한 구좌읍 요청에 따른 물량 변경 및 기타 현장 여건에 따른 물량 반영
	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사	538	ʼ23.05.03. ~ ʼ23.10.29.	508			△30	- 현장 여건에 따른 물량변동 반영
	대정·안덕 소규모 유량, 수압 감시시스템 구축사업	247	ʼ23.05.26. ~ ʼ23.12.11.	235			△12	- 현장여건에 따른 물량변동 반영
	2023년 남원대블록 누수처 복구공사	184	ʼ23.06.22. ~ ʼ23.12.30.	217			33	- 폐기물 100톤 초과 발생에 따른 분리발주 시행을 위한 공사 중지 및 연장
	한경면 조수(소) 판포계통 상수관망 개선사업	1,052	(당초) ʼ23.07.07. ~ ʼ24.01.02. (변경) ʼ23.07.07. ~ ʼ24.10.18.	-			-	- 차집관로 병행시공에 따른 이중굴착 방지와 예산 절감을 위하여 공사기간 반영
	송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사	829	ʼ24.07.11. ~ ʼ24.02.11.	804			△25	- 추가 물량 반영에 따른 공기연장과 현장 여건에 따른 물량변동 반영
	송당리 마을안길 노후상수관로 교체공사	812	ʼ23.07.28. ~ ʼ24.03.17.	894			82	- 추가 공사에 따른 공기연장과 현장 여건에 따른 물량변동 반영
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구) 전체분	5,097	ʼ23.01.30. ~ ʼ25.01.19.	5,413			316	- 현장 여건에 맞게 물량 조정
	성산3 하수관로 정비공사(2공구)	6,749	ʼ20.05.15. ~ ʼ24.12.31.	6,695			△54	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	성산3 하수관로 정비공사(3공구)	6,400	ʼ20.05.15. ~ ʼ25.5.12.	6,738			338	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업 1공구	5,963	ʼ19.12.18. ~ ʼ23.12.28.	6,130			167	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업 2공구	10,946	ʼ21.01.26. ~ ʼ24.11.17.	14,526	14,838		3,892	- 터널공사 토질상태 상이에 따른 암반굴착공법 변경 (세미쉴드→NATM) - 물가변동 반영
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 1공구	7,382	ʼ20.10.28. ~ ʼ24.10.18.	7,385	6,951		△431	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 2공구	6,129	ʼ20.06.18. ~ ʼ24.06.28.	6,327	5,981		△148	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 3공구	3,824	ʼ20.06.12. ~ ʼ24.05.28.	3,821	3,948	4,156	332	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사(2차분)	456	ʼ22.07.04. ~ ʼ23.10.03.	456			-	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(1공구)(전차분)	4,704	ʼ20.06.25. ~ ʼ23.07.24.	4,698			△6	- 현장여건에 맞게 시공물량 조정
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(2공구)(전체분)	2,874	ʼ22.04.13. ~ ʼ24.07.12.	3,234	3,489		615	- 현장여건에 맞게 시공물량 조정
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(2공구)(1차분)	1,044	ʼ22.04.13. ~ ʼ23.02.13.	1,136			92	- 현장여건에 맞게 시공물량 조정
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(2공구)(2차분)	213	ʼ23.03.17. ~ ʼ23.11.30.	625	765		552	- 현장여건에 맞게 시공물량 조정
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 1공구	6,033	ʼ20.06.26. ~ ʼ24.08.10.	6,121	6,156		123	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 2공구	2,113	ʼ20.06.23. ~ ʼ23.12.11.	2,113	2,041		△72	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	안덕면 사계리 배수설비 정비사업	328	ʼ23.05.31. ~ ʼ23.11.02.	325			△3	- 현장여건에 맞게 시공물량 조정
하수도부	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비사업(1공구)	5,155	ʼ19.12.26. ~ ʼ23.12.09.	5,515			360	- 비굴착 전체보수수량 조정 및 배수설비 물량정산, ES반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비사업(2공구)	4,652	ʼ19.12.23. ~ ʼ23.12.09.	4,735			83	- 비굴착 전체보수수량 조정 및 배수설비 물량정산, ES반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비사업(3공구)	3,977	ʼ19.12.18. ~ ʼ23.12.01.	4,137			160	- 오수관로 및 배수설비 물량 정산, ES반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비사업(4공구)	4,924	ʼ19.12.18. ~ ʼ24.04.26.	5,254			330	- 부지임대료반영,우수관로 시설, 오수관로 및 배수설비 물량 정산, ES반영
	남원 공공하수처리시설 증설사업	9,803	ʼ20.09.24. ~ ʼ23.08.28.	10,186	10,188		385	- 지반보강공 수량정산, 설계오류물량 변경, 관급자재 물량제외 및 조정, ES반영
	남원 공공하수처리시설 증설사업 전기 및 계측제어	1,012	ʼ21.12.10. ~ ʼ23.08.28.	1,001			△11	- 전력간선 및 설비공사 현장실정반영
	서귀포 남원하수처리구역 하수관로 정비사업 (2공구, 6차분)	1,218	ʼ23.01.16. ~ ʼ23.08.30.	1,039			△179	- 가설사무실 철거 및 부지임대료 정산반영, 배수설비 물량정산
	서귀포 남원하수처리구역 하수관로 정비사업 (3공구,6차분)	185	ʼ23.01.16. ~ ʼ23.04.12.	174			△11	- 관급자재 변경 및 현장여건반영 물량조정
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(1공구) 전기 및 계측제어공사	183	ʼ19.04.29. ~ ʼ23.02.19.	97			△86	- 맨홀펌프장 및 배수설비 시공정산
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구) 전기 및 계측제어공사	228	ʼ19.04.29. ~ ʼ23.09.01.	267			39	- 현장제어반 증가물량 반영 및 중복자재 수량제외
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_2공구)	4,900	ʼ23.03.13. ~ ʼ23.03.12.	5,218			318	- 야적장 운반거리 및 임대료 정산반영 및 보조기층,석분 물량 변경반영
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_3공구)	5,595	ʼ23.03.13. ~ ʼ23.03.12.	5,915			320	- 야적장 운반거리 및 임대료 정산반영 및 보조기층,석분 물량 변경반영
	월정공공하수처리시설 증설사업(전체분)	18,573	ʼ17.09.26. ~ ʼ25.07.18.	23,411			4,838	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	월정공공하수처리시설 증설사업(1차분)	3,975	ʼ17.09.26. ~ ʼ24.02.06.	6,465			2,490	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	연동-노형2 (이호처리분구) 노후하수관로정비공사 (노형1공구)	3,333	ʼ20.07.06. ~ ʼ23.12.15.	3,352	3,113	-	△220	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	연동-노형2 (이호처리분구) 노후하수관로정비공사 (노형2공구)	3,699	ʼ21.06.25. ~ ʼ23.12.15.	3,708	-	-	9	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
하수도부	도두하수처리구역 하수관로 정비사업(용담3공구)	4,414	ʼ21.05.26. ~ ʼ23.10.14.	4,422	4,983		569	- 현장여건에 맞게 물량조정
	제주 서부공공하수처리시설 증설공사	22,435	ʼ21.03.09. ~ ʼ24.08.22.	23,825			1,390	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	오라아라(1공구) 하수관로 정비사업	7,513	ʼ20.10.29. ~ ʼ25.01.31.	7,468	7,732		219	- 및 현장여건에 따른 시공물량 반영
	오라아라 하수관로 정비사업(2공구)	8,641	ʼ21.06.28. ~ ʼ24.03.19.	9,438			797	- 물가변동 및 현장 여건에 맞게 물량 조정
	오라아라 하수관로 정비사업(3공구)	7,914	ʼ22.01.24. ~ ʼ25.12.08.	8,856			942	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	조천처리분구 하수관로 정비사업(1공구)	3,018	ʼ22.05.11. ~ ʼ24.05.10.	3,272	3,536		518	- 물가변동 및 현장여건에 따른 시공물량 반영
	우도 천진리 농어촌마을 하수도 정비공사(3차분)	1,622	ʼ20.06.08. ~ ʼ23.09.21.	1,854			232	- 맨홀펌프장 위치 변경 등 현장실정 및 물가변동분 반영
	우도 농어촌마을 하수도 해양방류관로 설치공사(2공구)	4,271	ʼ20.0105. ~ ʼ23.08.28.	4,174			△97	방류관로 시공방법, 현장실정에 맞에 물량 조성 물가변동 반영
	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업 전기공사	2,119	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.07.02.	2,257			138	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	연동-노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (노형1공구)	3,652	ʼ20.07.06. ~ ʼ23.11.19.	3,916	3,975	3,967	315	- 현장여건 고려 시공물량 반영
	제주하수처리구역 차집관로 및 펌프장 비상자재 보관용 창고 신축공사	162	ʼ23.02.02. ~ ʼ23.05.19.	181			19	- 현장 여건에 맞게 물량 조정
	서회천도로변 오수펌프장 처리구역 차집관로 개량공사	303	ʼ23.02.22. ~ ʼ23.08.18.	322			19	- 현장 여건에 맞게 물량 조정

□ 2024년

(단위 : 백만원)

구 분	공 사 명	사업비	사업기간	설계변경			증감	변경사유
				1차	2차	3차
상수도부	남원읍 남원리 누수관 교체공사	134	ʼ24.01.08. ~ ʼ24.05.06.	138			4	- 실정보고 건에 따른 현장물량 반영 설계변경
	2023년 남원대블록 누수처 복구공사	177	ʼ24.01.12. ~ ʼ24.07.09.	171			△6	- 실정보고 건에 따른 현장물량 반영 설계변경
	2023년 표선대블록 누수처 복구공사	177	ʼ24.01.12. ~ ʼ24.07.09.	172			△5	- 실정보고 건에 따른 현장물량 반영 설계변경
	2024년 애월대블록 누수처 복구공사	196	ʼ24.02.28. ~ ʼ24.12.23.	196			-	- 실정보고건에 따른 현장물량 반영 설계변경
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구) 전체분	5,413	ʼ23.01.30. ~ ʼ25.01.19.	5,503			90	- 현장 여건에 맞게 물량 조정
	성산3 하수관로 정비공사(2공구)	6,695	ʼ20.05.15. ~ ʼ24.12.31.	6,055			△640	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	성산3 하수관로 정비공사(3공구)	6,738	ʼ20.05.15. ~ ʼ25.5.12.	6,235			△503	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구)	4,600	ʼ23.06.22. ~ ʼ26.06.21.	4,100			△500	- 현장여건에 맞게 시공물량 조정
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 1공구	6,951	ʼ20.10.28. ~ ʼ24.10.18.	7,138			187	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 2공구	5,981	ʼ20.06.18. ~ ʼ24.09.23.	5,961			△20	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 1공구	6,156	ʼ20.06.26. ~ ʼ24.11.08.	6,269	6,420		264	- 현장여건에 맞게 시공물량 조정
	안덕면 광평리 배수설비 정비공사	139	ʼ24.04.02. ~ ʼ24.06.32.	132			△7	- 현장여건에 맞게 시공물량 조정
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비사업(4공구)	5,254	ʼ19.12.18. ~ ʼ24.04.26.	5,253			△1	- 관매달기 공법변경 및 배수설비 물량정산
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_2공구)	5,218	ʼ23.03.13. ~ ʼ26.05.04.	5,565			347	- 정화조 폐쇄누락분 반영 및 배수설비 시공물량 정산, 교통신호수 산출정정, E/S반영
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_3공구)	5,915	ʼ23.03.13. ~ ʼ26.03.12.	6,209			294	- 배수설비 시공물량 정산 및 교통신호수 산출정정, E/S반영
	제주 서부공공하수처리시설 증설공사	23,825	ʼ21.03.09. ~ ʼ25.06.30.	19,507	24,328		503	- 총사업비 범위 내 금액조정 - 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업 전기공사	2,257	ʼ21.05.18. ~ ʼ25.06.30.	2,257	2,145		△112	- 총사업비 범위 내 금액조정
	서부(판포)하수처리장 증설사업 계측제어공사	386	ʼ21.09.17. ~ ʼ25.06.30.	311			△75	- 총사업비 범위 내 금액조정
	서부(판포) 공공하수처리시설 증설사업 소방공사	562	ʼ21.05.18. ~ ʼ25.06.30.	619			57	- 물가변동 반영
하수도부	오라아라(1공구) 하수관로 정비사업	7,732	ʼ20.10.29. ~ ʼ25.01.31.	7,841			109	- 물가변동 및 현장여건에 따른 시공물량 반영
	오라아라 하수관로 정비사업(3공 구)	8,856	ʼ22.01.24. ~ ʼ25.12.08.	9,188	9,421		565	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	월정공공하수처리시설 증설사업(1차분)	3,286	ʼ17.09.26. ~ ʼ24.03.27.	3,286	3,286		-	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	연동노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (연동1공구)	6,480	ʼ21.08.26. ~ ʼ24.12.03.	6,871	-	-	391	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	연동노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (연동2공구)	6,348	ʼ21.08.26. ~ ʼ24.12.06.	6,834	-	-	486	- 물가변동 반영 및 현장여건에 맞게 물량조정
	조천처리분구 하수관로 정비사업(1공구)	3,536	ʼ22.05.11. ~ ʼ24.10.13.	3,869			333	현장여건에 따른 시공물량 반영
	우도 천진리 농어촌마을 하수도 정비사업(3차)	1,854	ʼ20.06.08. ~ ʼ24.04.05.	1,787			△67	신설오수관로 및 배수설비 추가 반영 현장 실정에 맞게 반영
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비사업(하수관로)	3,771	ʼ20.05.04. ~ ʼ24.05.30.	3,672			△99	- 물가변동 및 현장여건에 따른 시공물량 반영
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)	2,077	ʼ20.05.04. ~ ʼ24.02.05.	2,195			118	현장여건에 따른 시공물량 반영
	제주시 동지역 차집관로(다호마을) 개량공사	142	ʼ24.02.22. ~ ʼ24.05.27.	171			29	- 현장여건에 맞게 물량 조정
	화북,삼양지역 하수펌프장 불명수(해수) 유입 맨홀 및 관로 보강공사	170	ʼ24.02.22. ~ ʼ24.08.28.	166			△4	- 현장 여건에 맞게 물량 조정

23. 공사중지 사업장(중지사유 포함) 및 공기연장사업 현황 (최근 3년간)

□ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분	분 류	건 수	사업비	비 고
총 계	공사중지 사업장	89	220,825
	공기연장 사업	59	211,557
상수도부	공사중지 사업장	31	15,576
	공기연장 사업	16	14,973
하수도부	공사중지 사업장	58	205,249
	공기연장 사업	43	196,584

□ 공사중지 사업장

구분	사업명 (사업장)	사업비 (백만원)	사업기간	공사중지기간	공사중지사유
상수도부	민군복합형 관광미항 진입로 시설공사	455	ʼ19.04.10. ~ ʼ23.08.21.	ʼ19.11.25. ~ ʼ23.07.11.	- 관광미항 도로공사 추진 지연에 따른 일시중지
	원인자부담금(애월지구) 상수도 시설사업	1,830	ʼ22.03.17. ~ ʼ23.04.24.	ʼ22.11.14. ~ ʼ23.01.26.	- 토지보상 협의
	표선지구 배수지 시설공사	925	ʼ22.05.03. ~ ʼ23.02.05.	ʼ22.12.02. ~ ʼ23.01.09.	- 도내 레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이 불가하여 관련문제 해소시까지 일시중지
	표선지구 상수도시설 전기공사	22	ʼ22.05.17. ~ ʼ23.02.23.	ʼ22.12.15. ~ ʼ23.01.26.	- 본공사(토목) 공정에 따른 일시중지
	원인자부담금(애월지구) 상수도 시설사업 전기공사	24	ʼ22.05.25. ~ ʼ23.05.30.	ʼ22.11.17. ~ ʼ22.01.26.	- 본공사(토목) 공정에 따른 일시중지
	고다시지구 배수지 확장공사	1,367	ʼ22.06.03. ~ ʼ23.12.09.	ʼ23.02.28. ~ʼ23.07.19.	- 지역주민 민원발생 및 관급자재(주철이형관) 수급지연으로 인해 관련 문제 해소시까지일시중지
	고다시지구 배수지 확장공사 전기공사	65	ʼ22.07.05. ~ ʼ23.12.15.	ʼ23.01.30. ~ ʼ23.12.11.	- 본공사(토목) 공정에 따른 일시중지
	동홍지구 배수지 확충공사	2,247	ʼ23.06.21. ~ ʼ24.10.12.	ʼ23.06.29. ~ ʼ23.08.10.	- 타공사(전기,태양광이설) 중첩구간발생하여 해당공사 선행시까지 일시중지
상수도부	원인자부담금(화북상업지구) 상수도 시설공사	1,740	ʼ23.06.22. ~ ʼ24.04.23.	ʼ23.09.27. ~ ʼ24.06.30.	- 상수도관 계획구간 변경에 - 따른 행정절차 이행을 위한 공사중지
	교래지구 도수관로 시설공사 전기공사	351	ʼ23.07.27. ~ ʼ24.02.17.	ʼ23.12.29. ~ ʼ24.01.17.	- 동절기 폭설에 따른 장비차량 진입불가 및 기온저하에 따른 콘크리트 시공품질 우려에 따른 중지
	표선(W-012), 오등(D-133)지하수 원상복구공사	19	ʼ23.02.03 ~ ʼ23.03.16.	ʼ23.02.23. ~ ʼ23.03.12.	- 건축물이 어린이집 놀이터와 인접하고 있어 어린이 안전사고 위험에 따라 3월5일 어린이집 휴원 이후 공사 재개
	어승생정수장 (광령지선) 상수도시설 긴급공사	98	ʼ23.02.24. ~ ʼ23.04.22.	ʼ23.03.02. ~ ʼ23.04.03.	- 농번기 농민들의 교통불편 최소화되는 적정시기까지 공사 일시중지
	지능형 수처리 운영센터 종합컨트롤타워 구축사업	2,310	ʼ22.08.16. ~ ʼ23.12.30.	ʼ23.01.16. ~ ʼ23.05.31.	- 통합운영센터 리모델링 준공일까지 구축용역 일시중지
	강정정수장 외 7개소 울타리 정비공사	65	ʼ23.05.23. ~ ʼ23.09.01.	ʼ23.06.15. ~ ʼ23.07.24.	- 2단계 다수공급자계약을 통해 관급자재를 선정하고자 적정시기까지 공사 일시중지하여 공기 확보
	도련정수장 사택 보수보강 공사	38	ʼ23.04.05. ~ ʼ23.05.24.	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.07.16.	- 사택 노후화에 따른 외부 벽체 균열에 의한 누수로 도배, 장판 등 수장작업 공정을 진행하기 어려워 벽체 건조 시까지 공사 일시중지
	2022년 정밀안전점검결과 시설물 보수공사	157	ʼ23.06.16. ~ ʼ23.08.14	ʼ23.07.25. ~ ʼ23.11.23.	- 어승생 제2제수지 구간에 장마로 인한 저수지 만수위로 인하여 내부 벽체 공사 추진이 어려워 적정시기까지 공사 일지중지하여 공기확보
	추자정수장 해수 담수화 시설 개량 및 증설사업 RO설비 (C,D호기) 긴급개량공사	493	ʼ23.07.03. ~ ʼ23.09.20.	ʼ23.09.04. ~ ʼ23.11.27.	- 관급자재(고압펌프, 에너지회수장치 등) 납품 시까지 일시중지
	오라정수장 급속여과기 도장공사	45	ʼ24.06.18. ~ ʼ24.07.12.	ʼ23.07.01. ~ ʼ23.08.16.	- 장마기간 내 우천으로 않아 페인트 도료가 급속여과기 철제면에 부착되지 않아 장마기간 종료시 까지 부득이 일시중지
	2022년조천읍일원누수처복구공사(2차)	13	ʼ22.04.06. ~ ʼ22.06.20.	ʼ22.05.19. ~ ʼ22.06.09.	- 도내레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이 불가하여 관련문제해소시까지일시중지
	2022년남원대블록사거리정비공사	138	ʼ22.05.30. ~ ʼ22.12.26.	ʼ22.06.10. ~ ʼ22.12.21.	- 도내 레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이 불가하여 관련문제 해소시까지 일시중지
	2022년표선면밸브설치공사	126	ʼ22.04.19. ~ ʼ22.09.07.	ʼ22.06.10. ~ ʼ22.08.30.	- 도내 레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이 불가하여 관련문제 해소시까지 일시중지
상수도부	2022년표선면감압밸브설치공사	108	ʼ22.05.23. ~ ʼ22.12.27.	ʼ22.06.10. ~ ʼ22.11.21.	도내 레미콘생산업체의 내부적- 문제(레미콘운송)로 관급수급이 불가하여 관련문제 해소시까지 일시중지
	2022년남원읍공기밸브설치공사	54	ʼ22.05.12. ~ ʼ22.09.02.	ʼ22.06.10. ~ ʼ22.08.02.	- 도내 레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이 불가하여 관련문제 해소시까지 일시중지
	구좌(01블록) 누수다발관 정비공사	186	ʼ22.06.17. ~ ʼ22.11.15.	ʼ22.09.02. ~ ʼ22.10.4.	- 동복리 마을행사 추진에 따른 안전사고 및 통행불편 우려제기
	종달항 인근 상수관망 개선공사	191	ʼ22.06.28. ~ ʼ22.10.14.	ʼ22.07.19. ~ ʼ22.08.07.	- 관급자재(상수도관) 납품 지연
	성산(04,07블록) 누수다발관 정비공사	149	ʼ22.06.23. ~ ʼ22.11.14.	ʼ22.10.14. ~ ʼ22.11.08.	- 도내레미콘 생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이 불가하여 관련문제 해소시까지 일시중지
	김녕사굴지구 상수관로 개선공사	192	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.08.20.	ʼ23.05.01. ~ ʼ23.06.04.	- 월정리 동부하수처리장 증설사업 관련 지역주민 민원해소 및 문화재보호구역(용천동굴) 지역주민 민원 해소시까지 일시중지
	남원읍 위미리 감압밸브 설치공사	85	ʼ24.01.08. ~ ʼ24.05.26.	ʼ24.03.27. ~ ʼ24.04.16.	- 관급자재 납품기일 반영
	남원읍 남원리 감압밸브 설치공사	114	ʼ24.01.08. ~ ʼ24.05.26.	ʼ24.03.27. ~ ʼ24.04.16.	- 관급자재 납품기일 반영
	송당마을안길 노후상수관로 교체공사	917	ʼ24.07.11. ~ ʼ24.02.11.	ʼ24.03.18. ~ ʼ24.04.16.	- 관급자재 납품기일 반영
	한경면 조수(소) 판포계통 상수관망 개선사업	1,052	ʼ23.07.07. ~ ʼ24.10.18	ʼ23.10.31. ~ ʼ24.08.16.	- 차집관로 병행시공에 따른 이중굴착 방지와 예산절감을 위하여 공사 일시 중지
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(2공구)	3,803	ʼ23.01.30. ~ ʼ25.01.19.	ʼ24.05.31. ~ 현재	- 국비 감액 지원에 따른 공사 추진 불가
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비공사 2공구	14,526	ʼ21.01.26. ~ ʼ24.11.17.	ʼ22.07.21. ~ ʼ22.11.28.	- 비굴착 추진공사 중 굴진량 저하문제로 대안공법 마련시까지 공사 일시 중지
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비공사 2공구	14,526	ʼ21.01.26. ~ ʼ24.11.17.	ʼ23.05.02. ~ ʼ23.06.14.	- 비굴착 추진공사 대안공법(NATM) 지하안전영향평가 이행 등 행정절차 완료시까지 공사 일시 중지
	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사(2차분)	456	ʼ23.03.24. ~ ʼ23.09.09.	ʼ23.07.04. ~ 현재	- 대포어촌계에서 주민생업 지장초래 등으로 성수기(7~9월)기간 동안 공사 일시중지
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 1공구	7,138	ʼ20.10.28. ~ ʼ24.10.18.	ʼ24.04.12. ~ ʼ24.06.10.	- 계약상대자인 ㈜도현종합건설이 내부 경영문제로 인해 본 공사의 이행이 계약대로 현장에서 시행되지 못함에 따라 공사 일시 중지
하수도부	서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사(3차분)	308	ʼ24.01.17. ~ ʼ24.07.31.	ʼ24.05.14. ~ 현재	- 맨홀펌프장 설치를 위한 관급자재(GRP맨홀펌프장, 수중펌프)납풉 시까지 공사 일시중지
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(1공구)	4,968	ʼ20.06.25. ~ ʼ23.07.24.	ʼ23.05.24. ~ 현재	- 장기계속사업으로 다음연도 예산확보 시 까지 공사 중지
	대정하수처리장 차집관로 정비사업(2공구)	3,489	ʼ22.04.13. ~ ʼ24.07.12.	ʼ23.12.08. ~ 현재	- 장기계속사업으로 다음연도 예산확보 시 까지 공사 중지
	서귀포시 안덕면 사계리 배수설비 정비사업	328	ʼ23.05.31. ~ ʼ23.08.30.	ʼ23.08.09. ~ ʼ23.10.11.	- 주요 관급자재(GRP맨홀) 납품 지연
	서귀포시 대정읍 하모리 소규모 하수관로 정비공사	58	ʼ23.10.12. ~ ʼ24.01.09.	ʼ23.12.05. ~ ʼ24.01.21.	- 하수관로 선형 변경 등 지역주민 협의기간 필요
	안덕면 대평리 간이오수처리시설 철거공사	44	ʼ24.06.17. ~ ʼ24.09.14.	ʼ24.06.20. ~ ʼ24.08.05.	- 석먼조사 및 해체계획서 작성 등
	우도 천진리 농어촌마을 하수도 정비공사(3차분)	1,622	ʼ20.06.08. ~ ʼ24.03.11.	ʼ21.07.09. ~ ʼ23.02.01. ʼ23.09.13. ~ ʼ23.12.04.	- 우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)과 준공 연계 필요
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)	2,078	ʼ20.05.04. ~ ʼ24.02.05.	ʼ21.12.30. ~ ʼ23.10.04.	- 우도 해양방류관로 설치완료 후 시운정 시행
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(하수관로)	3,533	ʼ20.05.04. ~ ʼ23.05.08.	ʼ22.05.04. ~ ʼ23.12.04.	- 우도 해양방류관로 설치완료 후 연계
	오라‧아라 하수관로 정비공사(1공구)1차분	6,683	ʼ20.10.29. ~ ʼ21.11.28.	ʼ21.08.23. ~ ʼ21.10.01.	- 야적장 이전에 따른 토지확보 기간 연장
	서부(판포)하수처리장 증설 통신공사	175	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.05.16.	ʼ21.06.05. ~ ʼ22.02.07.	- 주민설명회 및 대책위원회와 협의가 이루어질 때까지 일시정지
	서부(판포)공공하수처리시설 증설사업	21,106	ʼ21.03.09. ~ ʼ24.03.08.	ʼ21.04.29. ~ ʼ21.09.13.	- 판포리 마을회 이장(대책위원장) 요청
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업(용담2공구)	4,806	ʼ21.05.26. ~ ʼ23.10.06.	ʼ23.06.20. ~ 현재	- 2023년 시공지시분 완료 및 추가예산 확보시 까지 일시정지
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업(용담3공구)	4,036	ʼ21.05.26. ~ ʼ23.10.14.	ʼ23.06.01. ~ ʼ23.08.21.	- 한전관 저촉으로 이설 완료시 까지 일시정지
	2022 제주시 소규모 하수관로 정비사업	40	ʼ22.04.14. ~ ʼ22.07.20.	ʼ22.06.27. ~ ʼ22.07.10.	- 하수관로 부설위치 인근 민원발생
	조천처리분구하수관로정비사업(교래처리분구)	454	ʼ21.07.05. ~ ʼ22.07.04.	ʼ22.06.30. ~ ʼ22.07.17.	- 화물연대 총파업등의 영향으로 레미콘 주원료인 시멘트 공급이 원활치 않아 시공중지
	제주시 일도2동 노후 하수관로 정비공사(1공구)	3,249	ʼ20.05.25. ~ ʼ22.07.22.	ʼ22.04.29. ~ ʼ22.06.26.	- 레미콘운송조합 파업에 따른 레미콘 수급불가
	제주시 일도2동 노후 하수관로 정비공사(2공구)	4,862	ʼ20.07.01. ~ ʼ22.09.20.	ʼ22.04.25. ~ ʼ22.06.30.	- 레미콘운송조합 파업에 따른 레미콘 수급불가
하수도부	제주시 일도2동 노후 하수관로 정비공사(3공구)	4,838	ʼ20.06.10. ~ ʼ22.08.14.	ʼ22.04.26. ~ ʼ22.06.30.	- 레미콘운송조합 파업에 따른 레미콘 수급불가
	연동-노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (노형1공구)	3,975	ʼ20.07.06. ~ ʼ23.07.05.	ʼ22.05.12. ~ ʼ22.09.25.	- 레미콘운송조합 파업에 따른 레미콘 수급불가 및 선행공사
	연동-노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (노형2공구)	4,795	ʼ21.06.25. ~ ʼ23.11.18.	ʼ22.05.12. ~ ʼ22.06.07.	- 레미콘운송조합 파업에 따른 레미콘 수급불가
	연동-노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (연동1공구)	8,134	ʼ21.08.26. ~ ʼ24.01.03.	ʼ22.05.12. ~ ʼ22.06.21.	- 레미콘운송조합 파업에 따른 레미콘 수급불가
	연동-노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (연동2공구)	8,540	ʼ21.08.26. ~ ʼ24.01.06.	ʼ22.05.09. ~ ʼ22.06.21.	- 레미콘운송조합 파업에 따른 레미콘 수급불가
	서부(판포)공공하수 처리시설 증설사업 전기공사	1,941	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.05.16.	ʼ21.12.23. ~ ʼ22.02.07.	- 판포리 마을회 주민설명회 개최 결과에 따라 공사 일시정지
	서부(판포)하수처리장 증설 소방공사	563	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.05.16.	ʼ21.12.23. ~ ʼ22.02.07.	- 판포리 마을회 주민설명회 개최 결과에 따라 공사 일시정지
	서부(판포)하수처리장 증설 계측제어공사	386	ʼ21.09.17. ~ ʼ24.09.15.	ʼ21.12.23. ~ ʼ22.02.07.	- 판포리 마을회 주민설명회 개최 결과에 따라 공사 일시정지
	제주 서부공공하수처리시설 증설공사	21,106	ʼ21.03.09. ~ ʼ24.03.08	ʼ21.04.29. ~ ʼ21.09.13.	- 판포리 마을회 이장(대책위원장) 요청
	서부(판포)공공하수 처리시설 증설사업 전기공사	1,941	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.05.16.	ʼ21.12.23. ~ ʼ22.02.07.	- 판포리 마을회 주민설명회 개최 결과에 따라 공사 일시정지
	제주하수처리구역(도남·건입동)차집관로 정비공사	2,290	ʼ23.11.02. ~ ʼ25.04.24	ʼ24.01.18. ~ ʼ24.06.09.	- 공사구간의 극심한 교통체증 및 용천수 유입 예상됨에 따른, 보다 전문적이고 면밀한 시공방법 검토가 필요
	오라아라 하수관로 정비사업(2공구)	9,438	ʼ21.06.28. ~ ʼ24.03.19.	ʼ24.02.16. ~ 현재	- 국비 감액 지원에 따른 공사 추진 불가
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비(하수관로) 전기공사	67	ʼ20.06.12. ~ ʼ23.11.03.	ʼ22.02.15. ~ ʼ23.07.10.	- 우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)과 준공일 연계 필요
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비(처리시설) 전기공사	274	ʼ20.06.16. ~ ʼ23.11.07.	ʼ22.02.15. ~ ʼ23.07.10.	- 우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)과 준공일 연계 필요
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비(처리시설) 통신공사	60	ʼ20.06.17. ~ ʼ23.11.08.	ʼ22.02.15. ~ ʼ23.07.10.	- 우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)과 준공일 연계 필요
하수도부	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비(처리시설) 계장제어반 제작설치	208	ʼ20.06.26. ~ ʼ23.11.17.	ʼ22.02.15. ~ ʼ23.11.17.	- 우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)과 준공일 연계 필요
	우도 천진리 농어촌마을 하수도 정비 전기공사	79	ʼ20.06.22. ~ ʼ24.03.11.	ʼ22.02.15. ~ ʼ23.02.08. ʼ23.09.13. ~ ʼ23.12.21.	- 우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)과 준공일 연계 필요
	우도 천진리 농어촌마을 하수도 정비 계장제어반 제작설치	186	ʼ20.06.24. ~ ʼ22.06.23.	ʼ22.02.15. ~ 현재	- 우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(처리시설)과 준공일 연계 필요
	우도 하고수동 소규모 하수관로 정비공사	123	ʼ24.04.17. ~ ʼ24.08.14.	ʼ24.08.02. ~ 현재	- 관급자재 전동기제어반 납품 지연에 따라 부득이 공사 일시정지
	우도 하고수동 소규모 하수관로 정비 전기공사	7	ʼ24.07.16. ~ ʼ24.08.13.	ʼ24.08.05. ~ 현재	- 관급자재 전동기제어반 납품 지연에 따라 부득이 공사 일시정지
	제주하수처리구역(도남·건입동)차집관로 정비공사	2,290	ʼ23.11.02. ~ ʼ25.04.24	ʼ24.01.18. ~ ʼ24.06.09.	- 공사구간의 극심한 교통체증 및 용천수 유입 예상됨에 따른, 보다 전문적이고 면밀한 시공방법 검토가 필요
	오라아라 하수관로 정비사업(2공구)	9,438	ʼ21.06.28. ~ ʼ24.03.19.	ʼ24.02.16. ~ 현재	- 국비 감액 지원에 따른 공사 추진 불가
	월정공공하수처리시설 증설사업	13,784	ʼ17.09.26. ~ ʼ25..09.06.	ʼ24.04.23. ~ 현재	- 공공하수도설치(변경) 고시 무효확인 소송 집행정지 인용에 따라 부득이하게 공사중지
	월정공공하수처리시설 증설사업 전기공사	2,296	ʼ20.08.04. ~ ʼ25.02.21.	ʼ24.04.23. ~ 현재	- 공공하수도설치(변경) 고시 무효확인 소송 집행정지 인용에 따라 부득이하게 공사중지
	월정공공하수처리시설 증설사업	68	ʼ24.04.01. ~ ʼ25.09.12.	ʼ24.04.23. ~ 현재	- 공공하수도설치(변경) 고시 무효확인 소송 집행정지 인용에 따라 부득이하게 공사중지
	월정공공하수처리시설 증설사업	176	ʼ24.04.02. ~ ʼ25.09.23.	ʼ24.04.23. ~ 현재	- 공공하수도설치(변경) 고시 무효확인 소송 집행정지 인용에 따라 부득이하게 공사중지
	도두하수처리구역 하수관로정비사업 (용담2공구)	4,852	ʼ21.05.26. ~ ʼ24.03.16.	ʼ24.03.13. ~ 현재	- 안전휀스 설치비에 따른 시공사와 건설사업관리단간 이견 발생
	도두중계펌프장 유입스크린 보수공사	16	ʼ22.06.08. ~ ʼ22.07.14.	ʼ22.06.24. ~ ʼ22.07.05.	- 주요 관급자재(스크린 레이크) 납품 지연에 따른 일시중지
	제주시 동지역 차집관로(축산단지 마을안) 개량공사	146	ʼ22.03.04. ~ ʼ22.06.20.	ʼ22.03.17. ~ ʼ22.04.03.	- 주요 관급자재(폴리에틸렌관) 납품 지연에 따른 일시중지
하수도부	서회천도로변 오수펌프장 처리구역 차집관로 개량 공사	450	ʼ23.02.24. ~ ʼ23.08.20.	ʼ23.07.18. ~ ʼ23.08.15.	- 레미콘운송조합 파업(레미콘 수급불가)에 따른 일시중지
	제주하수처리구역 차집관로 및 펌프장 비상자재 보관용 창고 신축공사	181	ʼ23.02.02. ~ ʼ23.05.27.	ʼ23.04.20. ~ ʼ23.05.14.	- 설계변경(조립식 판넬 규격 변경)으로 자재제작 및 납품에 시간이 소요됨에 따라 일시중지
	제주하수처리구역 차집관로 및 펌프장 비상자재 보관용 창고 신축 전기공사	19	ʼ23.02.02. ~ ʼ23.05.29.	ʼ23.04.20. ~ ʼ23.05.16.	- 창고신축 건축공사 지연에 따른 일시중지
	월대펌프장 불명수(해수) 유입에 따른 하수관로 정비공사)	28	ʼ23.06.19. ~ ʼ23.08.14.	ʼ23.07.10. ~ ʼ23.08.06.	- 주요 사급자재(콘크리트 맨홀) 납품지연에 따른 일시중지
	화북, 삼양지역 하수펌프장 불명수(해수) 유입 맨홀 및 관로 보강공사	166	ʼ24.02.22. ~ ʼ24.08.28.	ʼ24.06.26. ~ ʼ24.08.11.	- 기상악화에 의한 안전사고가 우려되어 일시중지
	대정하수처리장 분배조 개선공사	100	ʼ24.06.19. ~ ʼ24.09.16.	ʼ24.08.20. ~ 현재	- 강우(태풍) 및 관광수요 급증에 따른 하수 유입량 부하로 공사 진행 어려워 갈수기 시 추진

□ 공기연장 사업 현황

구 분	사업명	사업비 (백만원)	사업기간	연장기간	연장사유
상수도부	애월정수장 고도정수처리시설사업	5,871	ʼ22.01.06. ~ ʼ23.07.06.	ʼ22.01.06. ~ ʼ23.12.19. (증 166일)	- 도내 레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이불가하여 관련문제로 인한 연장
	원인자부담금 (애월지구) 상수도 시설사업	1,961	ʼ22.03.17. ~ ʼ23.01.17.	ʼ22.03.17. ~ ʼ23.04.24. (증 97일)	- 도내 레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이불가하여 관련문제로 인한 연장
	원인자부담금 (구좌농공단지) 상수도시설공사	474	ʼ22.04.10. ~ ʼ23.10.06.	ʼ23.04.10. ~ ʼ23.10.18. (증 12일)	- 공사현장에 불가항력 사유(악천후)로 인한 절대공기 부족으로 부득이 공사기간 연장
	고다시지구 배수지 확장공사	1,367	ʼ22.06.03. ~ ʼ23.11.06.	ʼ22.06.03. ~ ʼ23.12.09. (증 33일)	- 도내 레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이불가하여 관련문제로 인한 연장
상수도부	교래지구 취수원(1호공) 개발사업	563	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.10.17.	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.11.26. (증 40일)	- 공사현장에 불가항력 사유(악천후)로 인한 절대공기 부족으로 부득이 공사기간 연장
	교래지구 취수원(2호공) 개발사업	564	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.10.17.	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.11.26. (증 40일)	- 공사현장에 불가항력 사유(악천후)로 인한 절대공기 부족으로 부득이 공사기간 연장
	교래지구 취수원(3호공) 개발사업	555	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.10.17.	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.11.26. (증 40일)	- 공사현장에 불가항력 사유(악천후)로 인한 절대공기 부족으로 부득이 공사기간 연장
	교래지구 취수원(4호공) 개발사업	550	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.10.17.	ʼ23.03.22. ~ ʼ23.11.19. (증 40일)	- 공사현장에 불가항력 사유(악천후)로 인한 절대공기 부족으로 부득이 공사기간 연장
	와산지구 상수도 시설공사	1,238	ʼ23.05.23. ~ ʼ24.04.01.	ʼ23.05.23. ~ ʼ24.04.16. (증 15일)	- 공사현장에 불가항력 사유(악천후)로 인한 절대공기 부족으로 부득이 공사기간 연장
	교래지구 도수관로 시설공사	587	ʼ23.06.14. ~ ʼ23.12.10.	ʼ23.06.14. ~ ʼ24.01.11. (증 32일)	- 공사현장에 불가항력 사유(악천후)로 인한 절대공기 부족으로 부득이 공사기간 연장
	애월정수장 고도정수처리시설사업 (계측제어공사)	278	ʼ22.08.26. ~ ʼ23.06.21.	ʼ22.08.26. ~ ʼ23.12.19. (증 181일)	- 주공종에 따른 부대공 연장
	구좌(01블록) 누수다발관 정비공사	186	ʼ22.06.17. ~ ʼ22.10.14.	ʼ22.06.17. ~ ʼ22.11.15 (증 32일)	- 동복리 마을행사 추진에 따른 안전사고 및 통행불편 우려에 따른 연장
	종달항 인근 상수관망 개선공사	191	ʼ22.06.28. ~ ʼ22.09.25.	ʼ22.06.28. ~ ʼ22.10.15. (증 20일)	- 관급자재(상수도관) 납품 지연
	성산(04,07블록) 누수다발관 정비공사	149	ʼ22.06.23. ~ ʼ22.10.20.	ʼ22.06.23. ~ ʼ22.11.14. (증 25일)	- 도내 레미콘생산업체의 내부적문제(레미콘운송)로 관급수급이불가하여 관련문제로 인한 연장
	김녕사굴지구 상수관로 개선공사	192	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.07.16.	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.08.20. (증 35일)	- 월정리 동부하수처리장 증설사업 관련 지역주민 민원해소 및 문화재보호구역(용천동굴) 지역주민 민원으로 인한 연장
	대정안덕 소규모 유량 수압 감시시스템 구축사업	247	ʼ23.05.26. ~ ʼ23.10.22.	ʼ23.05.26. ~ ʼ23.12.11. (증 50일)	- 관급자재 납품기한에 따른 공사기간 반영(굴착에 따른 현장관리 필요)
하수도부	성산3 하수관로 정비공사(1공구)	5,851	ʼ20.05.22. ~ ʼ23.05.21.	ʼ20.05.22. ~ ʼ26.04.27. (증 1,073일)	- 국비 교부액 감소에 따른 사업비 투입 지연
	성산3 하수관로 정비공사(2공구)	6,749	ʼ20.05.22. ~ ʼ23.05.21.	ʼ20.05.22. ~ ʼ24.12.31. (증 591일)	- 국비 교부액 감소에 따른 사업비 투입 지연
	성산3 하수관로 정비공사(3공구)	6,400	ʼ20.05.22. ~ ʼ23.05.21.	ʼ20.05.22. ~ ʼ25.05.12. (증 723일)	- 국비 교부액 감소에 따른 사업비 투입 지연
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업(1공구)	6,130	ʼ19.12.13. ~ ʼ23.12.28.	ʼ19.12.13. ~ ʼ24.11.17. (증 325일)	- 중문2공구(터널굴착공사) 완료시기에 맞춰 공사기간 연장
	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업(2공구)	14,526	ʼ21.01.26. ~ ʼ23.07.17.	ʼ21.01.26. ~ ʼ24.11.17. (증 488일)	- 터널굴착공법 변경에 따른 공공건설공사의 공사기간 산정기준에 의거 공사기간 산정 반영
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 1공구	7,385	ʼ20.10.28. ~ ʼ23.10.27.	ʼ20.10.28. ~ ʼ24.10.18. (증 357일)	- 국비지원 저조로 잔여물량에 대해 적정공사 산정 반영
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 2공구	5,961	ʼ20.06.18. ~ ʼ24.09.23.	ʼ20.06.18. ~ ʼ24.09.23. (증 87일)	- 우수관로 신규 반영에 따른 공사기간 산정기준에 의거 공사기간 산정 반영
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 3공구	4,155	ʼ20.06.12. ~ ʼ24.05.28.	ʼ20.06.12. ~ ʼ24.05.28. (증 162일)	- 오수관로 및 배수설비 신규 반영에 따른 공사기간 산정기준에 의거 공사기간 산정 반영
	대정하수처리장 차집관로 정비사업 (1공구)	4,698	ʼ20.06.25. ~ ʼ23.02.24.	ʼ20.06.25. ~ ʼ23.07.24. (증 151일)	- 암파쇄(미진동) 수량 증가에 따른 공기 연장
	대정하수처리장 차집관로 정비사업 (2공구, 1차분)	1,044	ʼ22.04.12. ~ ʼ23.01.12.	ʼ22.04.12. ~ ʼ23.02.13. (증 32일)	- 주택가 소음·진동 민원으로 인한 암파쇄(미진동) 공법 변경에 따른 공사기간 연장
	대정하수처리장 차집관로 정비사업 (2공구, 2차분)	625	ʼ23.03.17. ~ ʼ23.07.14.	ʼ23.03.17. ~ ʼ23.11.30. (139일)	- 예산 추가 반영에 따른 물량 증가
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업 (2단계) 1공구	6,121	ʼ20.06.26. ~ ʼ23.06.25.	ʼ20.06.26. ~ ʼ24.11.08. (증 502일)	- 국비지원 저조로 잔여물량에 적정 공사기간 산정 반영 및 레미콘 파업으로 인한 수급곤란 등
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업 (2단계) 2공구	2,113	ʼ20.06.23. ~ ʼ23.06.22.	ʼ20.06.23. ~ ʼ23.12.11. (증 172일)	- 레미콘 파업으로 인한 수급곤란 등
	남원공공하수처리시설 증설사업	10,188	ʼ20.09.24. ~ ʼ23.04.26.	ʼ20.09.24. ~ ʼ23.08.28. (증 124일)	- 태풍 힌남노 발생에 따른 포스코 포항제철소 침수 피해로 철강제품 생산 및 납품이 지연되어 기계공사 관급자재 납품설치 지연에 따라 기자재 설치 및 시운전기간 연장
하수도부	남원공공하수처리시설 증설사업 전기 및 계측제어 공사	1,001	ʼ21.12.10. ~ ʼ23.02.26.	ʼ21.12.10. ~ ʼ23.08.28. (증 183일)	- 본공사(토목) 기간 연장에 따른 전기공사 기간 연장
	남원공공하수처리시설 증설사업 전기 및 정보통신공사	70	ʼ21.12.07. ~ ʼ23.02.23.	ʼ21.12.07. ~ ʼ23.08.28. (증 186일)	- 본공사(토목) 기간 연장에 따른 전기공사 기간 연장
	남원공공하수처리시설 증설사업 소방공사	23	ʼ21.12.07. ~ ʼ23.02.23.	ʼ21.12.07. ~ ʼ23.08.28. (증 186일)	- 본공사(토목) 기간 연장에 따른 전기공사 기간 연장
	남원공공하수처리시설 증설사업 건설사업관리용역	1,930	ʼ20.11.09. ~ ʼ23.03.31.	ʼ20.11.09. ~ ʼ23.09.28. (증 182일)	- 본공사 기간연장에 따른 감리용역 연장
	서귀포 보목토평 하수관로 정비사업 전기 및 계측제어공사 관급자재(계측제어시스템)	334	ʼ21.10.28. ~ ʼ23.01.21.	ʼ21.10.28. ~ ʼ24.04.26. (461일)	- 전기공사 기간연장에 따른 관급자재 납품기한 연장
	서귀포시 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(4공구)	5,253	ʼ19.12.18. ~ ʼ24.04.26.	ʼ19.12.18. ~ ʼ24.05.14. (증 18일)	- 강수기간 강우일수 산정반영
	월정공공하수처리시설 증설사업	18,573	ʼ17.09.26. ~ ʼ25.02.21.	ʼ17.09.26. ~ ʼ25.07.18. (증 147일)	- 월정리 주민 증설공사 반대집회 시위기간 공기부족 일수에 대해서 공사기간 연장
	월정1공구(삼양2동~조천리) 오수간선관로 신설공사	5,454	ʼ17.06.27. ~ ʼ21.09.27.	ʼ17.06.27. ~ ʼ22.02.02. (증 128일)	- 추진공 구간내 암반층으로 작업능률 감소에 따른 기간 연장
	조천처리분구하수관로정비사업(교래처리분구)	454	ʼ21.07.05. ~ ʼ22.07.04.	ʼ21.07.05. ~ ʼ22.07.22. (증 18일)	- 화물연대 총파업등의 영향으로 레미콘 주원료인 시멘트 공급이 원활치 않아 공사기간 연장
	제주시 일도2동 노후 하수관로 정비공사(2공구)	4,862	ʼ20.07.01. ~ ʼ22.09.05.	ʼ20.07.01. ~ ʼ22.09.20. (증 15일)	- 당초 배수설비정비 포기 가옥에서 정비요청 및 아스콘포장 추가요청 등 민원발생
	동부(월정)공공하수처리시설 증설사업 전기공사	2,176	ʼ20.08.04. ~ ʼ22.08.03.	ʼ20.08.04. ~ ʼ24.02.19. (증 565일)	- 월정공공하수처리시설 증설사업 공사기간에 맞춰 전기 공사기간 연장
	서부처리구역(신엄, 곽지) 차집관로 정비사업	801	ʼ22.04.04. ~ ʼ22.07.29.	ʼ22.04.04. ~ ʼ22.10.29. (90일)	- 관급자재 납품지연, 소음민원으로 인한 암파쇄 공법 변경(무진동)으로 인한 공기 연장
	오라아라 하수관로 정비사업(2공구)	9,438	ʼ21.06.28. ~ ʼ23.06.27	ʼ21.06.28. ~ ʼ24.03.19 (증 266일)	- 국비예산 지원 감소 및 사업비 투입 지연으로 공기 연장
	오라아라(1공구) 하수관로 정비사업	7,841	ʼ20.10.29. ~ ʼ24.09.14	ʼ20.10.29. ~ ʼ25.01.31 (증 139일)	- 공사물량 추가 및 기상조건, 사업구간 중복 등에 따른 공사기간 연장
	오라아라 하수관로 정비사업(3공구)	9,421	ʼ22.01.24. ~ ʼ25.01.07	ʼ22.01.24. ~ ʼ25.12.08 (증 334일)	- 공사기간 관련 규정에 따른 공사기간 산출 근거에 따라 산정된 공사기간을 적용하여 연장
하수도부	우도 천진리 농어촌마을 하수도 정비공사(3차분)	1,854	ʼ20.06.08. ~ ʼ23.07.08.	ʼ20.06.08. ~ ʼ24.04.05. (증 199일)	- 기후변화(도항선운행중단) 및 현장실정을 반영한 추가물량분에 대한 기간 연장
	우도 농어촌마을 하수도 해양방류관로 설치공사(2공구)	4,174	ʼ22.01.05. ~ ʼ23.08.28.	ʼ22.01.05. ~ ʼ23.10.28. (증 61일)	- 태풍 및 너울성 파도로 인한 기상악화로 해상작업 작업일수 부족에 따른 공기 반영
	우도 비양동 농어촌마을 하수도 정비공사(하수관로)	3,771	ʼ20.06.22. ~ ʼ24.05.03.	ʼ20.06.22. ~ ʼ24.05.30. (증 29일)	- 기후변화(도항선운행중단)( 및 현장실정을 반영한 추가물량분에 대한 기간 연장
	서부공공하수 처리시설 증설공사	24,328	ʼ21.03.09. ~ ʼ24.07.22	ʼ21.03.09. ~ ʼ24.08.22. (증31일)	- 공사 정지기간 반영. (주민요구 사항 등 의견 청취 기간)
			ʼ21.03.09. ~ ʼ24.08.22.	ʼ21.03.09. ~ ʼ25.06.30. (증312일)	- 총사업비 범위 내 금액조정 및 시운전 반영 등
	서부(판포) 공공하수처리시설 증설사업 전기공사	2,145	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.05.16	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.07.02. (증47일)	- 공사 정지기간 반영 (마을 측 공사 재개 수용)
			ʼ21.05.18. ~ ʼ24.07.02.	ʼ21.05.18. ~ ʼ25.06.30. (증363일)	- 증설공사 일정에 맞게 기한 연장
	서부(판포)하수처리장 증설사업 통신공사	175	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.05.16	ʼ21.09.17. ~ ʼ25.01.19. (증248일)	- 공사 정지기간 반영 (마을 측 공사 재개 수용)
	서부(판포) 공공하수처리시설 증설사업 소방공사	619	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.05.16	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.07.02. (증47일)	- 공사 정지기간 반영 (마을 측 공사 재개 수용)
			ʼ21.05.18. ~ ʼ24.07.02.	ʼ21.05.18. ~ ʼ24.09.27. (증 87일)	- 공사 정지기간 반영 (산업환경설비공사업 계약자 공사 포기로 신규계약자 계약 체결)
			ʼ21.05.18. ~ ʼ24.09.27.	ʼ21.05.18. ~ ʼ25.06.30. (증 277일)	- 증설공사 일정에 맞게 기한 연장
	서부(판포)하수 처리장 증설사업 계측제어공사	311	ʼ21.09.17. ~ ʼ24.09.15	ʼ21.09.17. ~ ʼ24.11.01. (증 47일)	- 공사 정지기간 반영 (마을 측 공사 재개 수용)
			ʼ21.09.17. ~ ʼ24.11.01.	ʼ21.09.17. ~ ʼ25.06.30. (증 241일)	- 증설공사 일정에 맞게 기한 연장
	연동노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (노형1공구)	3,968	ʼ20.07.26. ~ ʼ23.11.19.	ʼ20.07.06. ~ ʼ23.12.15. (증 26일)	- 비굴착 전체보수 구간 내 오수맨홀 뚜껑 교체, 맨홀 인버트 설치, 맨홀 내부 보수 등 실정보고 승인(하수도부-32047호) 사항에 대하여 작업 소요기간 필요에 따른 공사기간 연장
하수도부	연동노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 (노형2공구)	4,642	ʼ21.06.25. ~ ʼ23.11.18.	ʼ21.06.25. ~ ʼ23.12.15. (증 27)	- 개보수공 잔여구간 현장여건에 따른 공법 변경 실정보고 승인(하수도부-41622호)과 관련하여 공법변경 시공 및 이에 따른 사전조사, 결과보고서 작성 소요기간 필요에 따른 공사기간 연장
	우도 천진리 농어촌마을 하수도 정비 전기공사	79	ʼ20.06.22. ~ ʼ23.07.08.	ʼ20.06.22. ~ ʼ23.09.21. (증 75일)	- 본 공사의 선행공정(토목공사) 공사기간이 변경됨에 따라 토목공사 준공 시까지 기간 연장
	서부처리구역 (신엄, 곽지) 차집관로 정비사업	801	ʼ22.04.04. ~ ʼ22.07.29	ʼ22.04.04. ~ ʼ22.10.29. (증 92일)	- 관급자재 납품지연, 소음민원으로 인한 암파쇄 공법 변경(무진동)으로 인한 공기 연장
	제주시 추자도(영흥리) 소규모 공공하수처리시설 방수공사	12	ʼ22.09.08. ~ ʼ22.09.27.	ʼ22.09.08. ~ ʼ22.10.06. (증 9일)	- 태풍 내습에 따른 공사 진행 불가로 인한 공사기간 연장
	서부하수처리장 산기관 교체공사	128	ʼ24.03.25. ~ ʼ24.05.23.	ʼ24.03.25. ~ ʼ24.06.11. (증 19일)	- 본 공사의 자재인 산기장치의 전문적인 성능검증에 따른 관급자재 납품 지연으로 공사기간 연장

24. 각종 용역 설계변경 현황(20백만원 이상)

□ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분		건 수	사업비	설계변경	증감	비 고
총 계		111	57,908	62,331	4,423
상수도부	소 계	21	2,798	2,940	142
	2023	18	2,666	2,780	114
	2024	3	132	160	28
하수도부	소 계	89	53,776	57,878	4,102
	2023	63	34,857	37,924	3,067
	2024	26	18,919	19,954	1,035
현대화 추진단	소 계	1	1,334	1,513	179
	2023	1	1,334	1,513	179
	2024	-	-	-	0

□ 2023년

(단위 : 백만원)

구 분	용 역 명	사업비	사업기간	설계변경			증감	변경사유
				1차	2차	3차
상수도부	애월정수장 고도정수처리 시설사업 건설사업 관리용역	1,313	ʼ22.01.05. ~ ʼ23.12.19.	1,404			91	- 물가 변동에 따른 계앾금액 조정과 주 공사(건축, 토목, 전기) 일정에 맞게 건설관리용역 기간연장
	원인자부담금 (애월지구) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	37	ʼ22.04.01. ~ ʼ23.05.01.	68			31	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경
	원인자부담금 (애월지구) 상수도 시설공사 GIS DB 구축 용역	29	ʼ22.04.04. ~ ʼ23.06.21.	51			22	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경
	고다시지구 배수지 확장공사 폐기물처리용역	35	ʼ22.06.23. ~ ʼ23.12.24.	43	-	-	8	- 본 공사 최종 폐기물 반출에 따른 수량 조정반영
	상수도 시설사업(동홍지구) 실시설계용역	95	ʼ23.03.17. ~ ʼ23.12.22.	100	-	-	5	- 건설기술진흥법에 따라 설계안전성검토 비용 반영
	원인자부담금 (화북상업단지) 배수지 시설공사 실시설계용역	84	ʼ23.04.25. ~ ʼ23.12.13.	88			4	- 건설기술진흥법에 따라 설계안전성 검토 비용 반영
	원인자부담금 (구좌농공단지) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	63	ʼ23.05.08. ~ ʼ23.11.03.	66			3	- 본 공사 최종 폐기물 반출에 따른 수량 조정반영
	원인자부담금(외도이동) 상수도 시설공사 폐기물처리용역	35	ʼ23.05.19. ~ ʼ23.11.14.	33	-	-	△2	- 본 공사 최종 폐기물 반출에 따른 수량 조정반영
	2023년 상수도시설물(6구역) 전기안전관리대행 용역	37	ʼ23.01.06. ~ ʼ23.12.31.	34	35		△2	애월가압장 계약전력 증가로(800→1,050kW) 전기안전관리자 상주배치에 따른 위탁용역 점검횟수 감소(월 4회→ 월2회) 애월정수장 수전설비 및 발전설비 용량 증가로 인한 점검수수료 증가
	강정정수장 현대화사업 소규모 환경영향평가용역	40	ʼ23.01.30. ~ '23.10.05.	50			10	‘환경영향평가등 제대행 승인 및 관리지침’에 따라 동식물상 조사를 제대행하여야 하는 사항으로 추가 반영 ‘환경분야 시험·검사 등에 관한 법률’에 따른 지표·지하수질·해양수질 및 토양(다이옥신) 조사 항목 추가
상수도부	봉개2호배수지 외 2개소 배수지 철거공사 폐기물처리용역	18	'23.06.02. ~ '23.08.30.	26			8	- 현장 여건 및 재료 수급 등 실지시공에 맞추어 물량을 정산하고, 이에 대한 물량을 조정·반영
	남원대블록 유수율 제고용역(1차분)	405	ʼ22.12.29. ~ ʼ23.06.30.	386			△19	- 출수 불량 민원해소 건수 없어 정산 변경
	표선대블록 유수율 제고용역(1차분)	253	ʼ22.12.29. ~ ʼ23.6.30.	234			△19	- 출수불량민원해소건수 없어 정산 변경
	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사 GIS DB구축용역	30	ʼ23.05.16. ~ ʼ23.11.11.	28	-	-	△2	- 공사물량 감소(108m)에 따른 GIS DB구축 용역 물량 조정
	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사 폐기물처리 용역	47	ʼ23.05.16. ~ ʼ23.11.11.	44	-	-	△3	- 공사물량 감소(108m)에 따른 폐기물 용역 물량 조정
	송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사 페기물처리용역	40	ʼ23.07.11. ~ ʼ24.03.12	47			7	- 대상 공사의 1개 차선 절삭 후 재포장에 따른 물량 변경
	송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사 GIS DB구축 용역	79	ʼ23.07.11. ~ ʼ24.05.11.	55			△24	- 대상 공사의 물량 변경에 연장 변경
	조천소블록(소공원) 상수관망 긴급개선공사 GIS DB 구축용역	26	ʼ23.08.01. ~ ʼ23.10.29.	22			△4	- 본공사 연장감소에 따른 물량 증감 반영
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비사업 건설사업관리용역	1,919	ʼ22.12.20. ~ ʼ25.01.19.	1,998			79	- 물가변동에 따른 계약금액 조정
	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구) 폐기물처리용역	31	ʼ23.03.20. ~ ʼ24.01.19.	20			△11	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경
	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(2공구) 폐기물처리용역	73	ʼ23.03.20. ~ ʼ24.01.19.	69			△4	- 실제 운반거리 반영
	성산3하수관로정비사업 건설사업관리용역	2,248	ʼ22.08.22. ~ ʼ24.12.31	2,248	2,294		46	- 국비 교부액감소로 계약기간 연장 및 물가변동으로인한 금액 조정
	성산3 하수관로 정비공사 폐기물처리용역 (2공구, 2022년)	70	ʼ22.06.30. ~ ʼ23.07.21	69			△1	- 본공사 설계변경에 따른 물량 조정
	성산3 하수관로 정비공사 CCTV조사 및 수밀시험용역(2공구, 2022년)	101	ʼ22.07.01. ~ ʼ23.09.30	94			△7	- 본공사 설계변경에 따른 물량 조정
	성산3 하수관로 정비공사 CCTV조사 및 수밀시험용역(3공구, 2022년)	84	ʼ22.06.10. ~ ʼ25.05.12	86			2	- 본공사 설계변경에 따른 물량 조정
하수도부	성산3 하수관로 정비공사 GIS DB구축용역 (3공구, 2022년)	63	ʼ22.06.10. ~ ʼ25.05.12	65			2	- 본공사 설계변경에 따른 물량 조정
	서귀포시 동지역 차집관로 정비 사업 기본 및 실시설계용역(2차분)	971	ʼ22.01.10. ~ ʼ23.09.11.	1,145			174	- 사업계획 변경에 따른 과업범위 추가 수행 및 직접조사시 정산
	서귀포 중문관광단지 노후하수관로 정비사업 건설사업관리용역	2,029	ʼ20.09.07. ~ ʼ24.12.17.	2,054			25	- 물가변동에 따른 계약금액 조정 반영
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 건설사업관리용역	2,154	ʼ20.10.19. ~ ʼ24.11.18.	2,188			34	- 물가변동에 따른 계약금액 조정 반영
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 1공구 건설폐기물처리용역	453	ʼ21.04.14. ~ ʼ24.10.18.	495			42	- 시공사 설계변경에 따른 폐기물 처리수량 변경으로 계약 금액 조정 반영
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 건설폐기물처리용역	316	ʼ21.04.20. ~ ʼ24.06.28.	373			57	- 시공사 설계변경에 따른 폐기물 처리수량 변경으로 계약 금액 조정 반영
	서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 건설폐기물처리용역	216	ʼ21.04.20. ~ ʼ24.05.28.	180			△36	- 시공사 설계변경에 따른 폐기물 처리수량 변경으로 계약 금액 조정 반영
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 건설사업관리용역	1,315	ʼ20.11.09. ~ ʼ24.08.10.	1,646			331	- 물가변동에 따른 계약금액 조정 반영 및 본 공사 준공일에 맞춰 건설사업관리기술인 투입 등 변경 반영
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 1공구 건설폐기물처리용역	363	ʼ21.04.15. ~ ʼ24.08.10.	306			△57	- 본 공사 설계변경에 따른 폐기물처리물량 변경 반영
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 건설폐기물처리용역	87	ʼ21.04.09. ~ ʼ23.12.11.	124	124		37	- 본 공사 설계변경에 따른 폐기물처리물량 변경 반영
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 1공구 CCTV조사 및 수밀시험용역	105	ʼ21.04.21. ~ ʼ24.08.10.	86			△19	- 본 공사 설계변경에 따른 CCTV조사 및 수밀시험물량 변경 반영
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 CCTV조사 및 수밀시험용역	37	ʼ21.04.09. ~ ʼ23.12.11.	53	56		19	- 본 공사 설계변경에 따른 CCTV조사 및 수밀시험물량 변경 반영
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 1공구 GIS DB구축 용역	72	ʼ21.04.01. ~ ʼ24.08.10.	45			△27	- 본 공사 설계변경에 따른 GIS DB구축 물량 변경 반영
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 GIS DB구축 용역	37	ʼ21.04.01. ~ ʼ23.12.11.	39			2	- 본 공사 설계변경에 따른 GIS DB구축 물량 변경 반영
하수도부	대정차집관로 정비사업(1공구)CCTV조사	24	ʼ21.04.05. ~ ʼ23.07.24.	21			△3	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	대정차집관로 정비사업(1공구)수밀시험	100	ʼ21.03.29. ~ ʼ23.07.24.	92			△8	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	대정차집관로 정비사업(1공구)폐기물처리	180	ʼ20.02.27. ~ ʼ23.07.24.	182			2	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	대정차집관로 정비사업(1공구)GIS DB구축	62	ʼ21.02.09. ~ ʼ23.07.24.	58			△4	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	안덕면 사계리 하수관로 정비사업 폐기물처리	30	ʼ23.06.14. ~ ʼ23.11.13.	32			2	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(1공구) 폐기물처리용역	209	ʼ20.11.16. ~ ʼ23.12.31.	147	144		△65	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(2공구) 폐기물처리용역	227	ʼ20.11.16. ~ ʼ23.12.31.	306	260		33	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(3공구) 폐기물처리용역	189	ʼ20.11.16. ~ ʼ23.02.15.	204	203		14	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(4공구) 폐기물처리용역	215	ʼ20.11.20. ~ ʼ24.05.25.	211	214		△1	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(1공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역	69	ʼ20.11.16. ~ ʼ23.02.15.	80			11	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(2공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역	170	ʼ20.11.16. ~ ʼ23.12.09.	181			11	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경 반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(3공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역	121	ʼ20.11.16. ~ ʼ23.02.15.	127			6	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(4공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역	155	ʼ20.11.16. ~ ʼ24.05.17.	152			△3	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경
	서구포시 보목토평 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	2,016	ʼ20.08.05. ~ ʼ24.05.26.	2,060	2,155		139	- 물가변동에 따른 계약금액 조정 등
	남원 공공하수처리시설 증설사업(조경) 폐기물 처리용역	15	ʼ23.07.19. ~ ʼ23.09.16.	19			4	- 현장여건에 따른 폐기물 물량 증가
	남원 공공하수처리시설 증설사업 건설사업관리용역	1,689	ʼ20.11.09. ~ ʼ23.09.28.	1,930			241	- 물가변동 반영 본공사 공사기간 연장에 따른 감리기간 연장
하수도부	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	2,132	ʼ18.03.29. ~ ʼ23.09.15.	2,080			△52	- 사업기간 조정(감)
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구,6차분) 폐기물처리용역	108	ʼ23.04.18. ~ ʼ23.12.15.	106			△2	물량정산
	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구,6차분) CCTV조사 및 공기압	24	ʼ23.03.29. ~ ʼ23.12.15.	21			△3	- 본 공사 현장여건 변동에 따른 사업물량 감소
	남원 공공하수처리시설 증설 사업 폐기물 처리용역	8	ʼ23.03.29. ~ ʼ23.10.10.	14			6	- 현장여건에 따른 폐기물 물량 증가
	월정공공하수처리시설 증설사업 건설사업관리용역	2,769	ʼ21.07.25. ~ ʼ25.10.06.	3,126	3,237		468	- 물가변동 계약금액 조정 및 투입인원 조정
	서부(판포)하수처리장 증설사업 건설사업관리용역	2,729	ʼ21.8.17. ~ ʼ24.10.14.	2,794			65	- 물가변동 조정금액 반영
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업(용담3공구)폐기물처리용역	70	ʼ21.05.17. ~ ʼ23.10.16	85	136		66	- 포장공 시공수량 변경에 따른 폐기물 물량변경
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	877	ʼ21.04.22. ~ ʼ23.09.10	894	992	1,041	164	- 본 공사 기간 연장에 따른 기술인 추가 배치
	서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계) 건설사업관리용역	1,333	ʼ22.08.22. ~ ʼ22.06.21	1,719			386	- 용역기간 및 투입인원 변경
	우도 농어촌마을 하수도 정비사업 건설사업관리용역	1,405	ʼ22.08.03. ~ ʼ24.06.08.	1,565	1,823		418	- 본 공사 공사기간 연장에 따른 건설사업관리 기간 연장에 따른 용역비 증액
	조천처리분구 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	1,037	ʼ22.09.13 ~ ʼ24.10.28	1,067			30	- 물가변동 반영
	제주시 추자면 하수관로 기술진단용역	87	ʼ23.06.27 ~ ʼ23.09.24	94			7	물량 변경 반영
	연동-노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형1공구) CCTV조사 및 수밀시험용역	98	ʼ21.04.12. ~ ʼ23.12.15.	73			△25	- 도급공사 설계변경에 따른 물량 증가
	2023년 남원하수처리장 자가용전기설비 안전관리대행	20	ʼ23.01.01. ~ ʼ23.12.31.	16			△4	- 전기 수전용량 증설에 따른 변경
	제주도 도서지역 소규모 공공하수처리시설 통합원격관리체계 구축사업 실시설계용역	191	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.07.20.	285			94	과업대상 추가 및 한국환경공단 기술자문 검토기간 반영
하수도부	오라아라 하수관로 정비사업(2공구)영평처리분구폐기물처리용역	156	ʼ21.09.30. ~ ʼ24.03.19.	132			△24	- 본 공사 변경에 따른 폐기물처리 물량 정산
	오라아라 하수관로 정비사업(3공구) GIS DB 구축용역	129	ʼ23.02.13. ~ ʼ26.02.12.	108			△21	- 과업구간 조정에 따른 변경
	연동~노형2 (이호처리분구) 노후하수관로 정비공사 건설사업관리용역	1,666	ʼ21.07.23. ~ ʼ24.12.19.	1,952			286	- 도급공사 공사기간 연장에 따른 과업기간 연장 및 물가변동 반영
	연동노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형2공구) 폐기물처리용역	163	ʼ21.04.05 ~ ʼ23.12.03	148			△15	- 도급공사 설계변경 및 공사기간 반영
	연동~노형2 (이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형1공구) cctv조사 및 수밀시험용역	99	ʼ21.04.12. ~ ʼ23.12.15.	73			△26	- 용역중지기간 및 도급공사 설계변경 반영
	연동~노형2 (이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형1공구) GIS DB 구축용역	42	ʼ23.03.27. ~ ʼ24.01.26.	31			△11	- 도급공사 설계변경 반영
	연동~노형2 (이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형2공구) 폐기물처리용역	259	ʼ21.09.30. ~ ʼ23.12.28.	224			△35	- 도급공사 설계변경 및 공사기간 반영
	연동~노형2 (이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형2공구) cctv조사 및 수밀시험용역	139	ʼ21.11.04. ~ ʼ24.01.02.	107			△32	- 도급공사 설계변경 반영
	도두하수처리 구역 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	876	ʼ21.04.22. ~ ʼ23.12.11.	1,041			165	- 공사기간 연장에 따른 용역기간 연장 및 참여자별 투입기간 조정
	제주도 도서지역 소규모 공공하수처리시설 통합원격관리체계 구축사업 실시설계용역	191	ʼ23.01.10. ~ ʼ23.12.23.	285			94	과업대상 추가 및 한국환경공단 기술자문 검토기간 반영
	2023년 동부하수처리장 및 중계펌프장 전기안전관리대행 용역	34	ʼ23.01.09. ~ ʼ23.12.31.	35			1	동김녕중계펌프장 비상발전기 설치로 인한 용량 증가
현대화 추진단	2023년제주하수처리장임시탈수시설슬러지운반및처리용역	1,334	ʼ23.08.11. ~ ʼ24.03.31.	1,513			179	발생 슬러지 처리량 증가

□ 2024년

(단위 : 백만원)

구 분	용 역 명	사업비	사업기간	설계변경			증감	변경사유
				1차	2차	3차
상수도부	강정정수장 현대화사업 착공식 행사 대행 용역	30	ʼ24.01.04. ~ ʼ24.01.10.	36			6	강정정수장 현대화사업 착공식 추진 관련 불필요 항목(기념품) 수량 변경
	조천정수장 정수지 외 26개소 청소용역	78	ʼ24.03.21. ~ ʼ24.08.17.	98	93		15	조천정수장, 토평정수장 정수지 유입, 유출밸브 노후화로 인해 작동 시 고장 우려가 높아 실제 시공에 맞추어 물량정산
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 착공식 행사 대행 용역	24	ʼ24.07.26. ~ ʼ24.08.14.	31			7	기상악화로 인한 착공식 행사 축소에 따른 물량 정산 반영
하수도부	남원하수처리장 노후차집관로 정비사업 건설사업관리용역	1,998	ʼ22.12.20. ~ ʼ25.01.19.	2,046			48	- 물가변동에 따른 계약금액 조정
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 건설사업관리용역	1,646	ʼ20.11.09. ~ ʼ24.11.08.	1,713			67	- 본 공사 준공일에 맞춰 건설사업관리기술인 투입 등 변경 반영
	서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 GIS DB구축 용역	39	ʼ21.04.01. ~ ʼ24.04.14.	42			3	- 본 공사 설계변경에 따른 GIS DB구축 물량 변경 반영
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(4공구) 폐기물처리용역	214	ʼ20.11.20. ~ ʼ24.05.25.	225			11	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경
	서귀포 보목토평(1차) 하수관로 정비공사(4공구) CCTV조사 및 수밀시험 용역	152	ʼ20.11.16. ~ ʼ24.05.17.	151			△1	- 본 공사 설계변경에 따른 물량 변경
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_2공구) 건설폐기물 처리용역	80	ʼ23.11.03. ~ ʼ24.03.31	83			3	물량정산
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_3공구) 건설폐기물 처리용역	75	ʼ23.11.03. ~ ʼ24.03.31	57			△18	물량정산
	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_3공구) CCTV조사 및 수밀시험용역	55	ʼ23.11.03. ~ ʼ24.03.31	36			△19	공사 시행분변경
	서부(판포)하수처리장 증설사업 건설사업관리용역	2,794	ʼ21.08.17. ~ ʼ25.06.30.	2,794	2,900		106	- 물가변동 조정금액 반영
하수도부	서부(판포) 공공하수처리시설 증설사업 건설폐기물처리용역	101	ʼ21.04.29. ~ ʼ25.06.30.	135			34	- 본 공사 추진에 따른 폐기물 처리 수량을 실정에 맞게 조정
	오라아라 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	1,906	ʼ21.01.04. ~ ʼ25.03.09.	2,338			432	- 물가변동 및 감리배치조정 등에 따른 변경
	오라아라 하수관로 정비사업 (3공구1차)건설폐기물처리용역	187	ʼ22.05.26. ~ ʼ25.05.25.	208			21	- 본 공사 변경에 따른 폐기물처리 물량 정산
	월정공공하수처리시설 증설사업 건설사업관리용역	3,237	ʼ21.07.25. ~ ʼ25.10.06.	3,392			155	- 물가변동 계약금액 조정 및 투입인원 조정
	동부하수처리구역 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	1,578	ʼ23.06.16. ~ ʼ24.09.25.	1,577			△1	CCTV 물량 조정 및 압송관 시편채취비 반영
	연동~노형2 (이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형2공구) GIS DB 구축용역	60	ʼ23.03.27. ~ ʼ24.01.26.	53			△7	- 도급공사 설계변경 반영
	연동~노형2 (이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(연동1공구) 폐기물처리용역	294	ʼ21.12.29. ~ ʼ24.12.26.	317			23	- 도급공사 설계변경 및 공사기간 반영
	연동~노형2 (이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(연동2공구) 폐기물처리용역	316	ʼ21.11.10. ~ ʼ24.12.31.	307			△9	- 도급공사 설계변경 및 공사기간 반영
	도두하수처리 구역 하수관로 정비사업 건설 사업관리용역	1,041	ʼ21.04.22. ~ ʼ24.03.26.	1,062			21	- 공사기간 연장에 따른 용역기간 연장 및 참여자별 투입기간 조정
	도두하수처리 구역 하수관로 정비사업(용담2공구) 폐기물 처리용역	95	ʼ21.05.17. ~ ʼ24.04.01.	109			14	- 토목공사 시공수량 변경에 따른 폐기물 처리수량 변경
	도두하수처리 구역 하수관로 정비사업(용담2공구) CCTV 조사 및 수밀시험용역	29	ʼ21.05.17. ~ ʼ24.06.08.	30			1	- 토목공사 시공수량 변경에 따른 용역수량 변경 및 중지기간 반영
	도두하수처리 구역 하수관로 정비사업(용담2공구) GISDB 구축 용역	12	ʼ21.09.07. ~ ʼ24.04.16.	13			1	- 용역수량 및 성과심사수수료 변경
하수도부	도두하수처리 구역 하수관로 정비사업(용담3공구) 폐기물 처리용역	71	ʼ21.05.17. ~ ʼ24.03.12.	136			65	- 용역중지기간 반영에 따른 기간 변경
	도두하수처리 구역 하수관로 정비사업(용담3공구) CCTV 조사 및 수밀시험용역	35	ʼ21.05.17. ~ ʼ24.03.31.	34			△1	- 토목공사 시공수량 변경에 따른 용역수량 변경
	도두하수처리 구역 하수관로 정비사업(용담3공구) GISDB 구축 용역	14	ʼ21.09.07. ~ ʼ24.05.22.	15			1	- 용역수량 및 성과심사수수료 변경
	우도 농어촌마을 하수도 정비사업 건설사업관리용역	1,823	ʼ22.08.03. ~ ʼ24.06.08.	1,953			130	- 본 공사 공사기간 연장에 따른 건설사업관리 기간 연장에 따른 용역비 증액
	조천처리분구 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	1,067	ʼ22.09.13. ~ ʼ24.10.28.	985	1,022		△45	- 물가변동 반영 및 기술인 투입계획 조정

25. 수의계약 현황(인쇄물 제외)

□ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분		구분	건 수	사업비	비 고
총 계			599	30,379
경영관리과	소 계		16	356
	2023	1천만원 ~ 2천만원	7	121
		2천만원 ~ 5천만원	2	68
		5천만원 이상	-	-
	2024	1천만원 ~ 2천만원	5	90
		2천만원 ~ 5천만원	2	77
		5천만원 이상	-	-
상수도부	소 계		277	19,527
	2023	1천만원 ~ 2천만원	139	2,241
		2천만원 ~ 5천만원	50	1,887
		5천만원 이상	11	7,740
	2024	1천만원 ~ 2천만원	40	623
		2천만원 ~ 5천만원	35	1,490
		5천만원 이상	2	5,546
하수도부	소 계		268	8,949
	2023	1천만원 ~ 2천만원	140	2,262
		2천만원 ~ 5천만원	52	1,870
		5천만원 이상	7	1,111
	2024	1천만원 ~ 2천만원	48	789
		2천만원 ~ 5천만원	16	539
		5천만원 이상	5	2,378
현대화추진단	소 계		38	1,547
	2023	1천만원 ~ 2천만원	26	427
		2천만원 ~ 5천만원	3	101
		5천만원 이상	1	209
	2024	1천만원 ~ 2천만원	6	106
		2천만원 ~ 5천만원	1	32
		5천만원 이상	1	672

□ 2023년

❍ 2023년 1천만원 이상 2천만원 미만

(단위 : 백만원)

부서명	구분	사업명	사업개요	사업비	업체명	사유
경영관리과	용역	상하수도요금 e-mail고지서 발송 시스템 업그레이드 용역	시스템 업그레이드 1식	15	제이티정보	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
	용역	2022회계연도 수도사업특별회계 회계자문 및 결산지원 용역	회계자문 및 결산 1식	16	김길복공인회계사사무소	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
	용역	제주특별자치도 2022회계연도 하수도공기업특별회게 결산지원 용역	결산 1식	16	김길복공인회계사사무소	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
	용역	제주특별자치도 하수도 중장기 경영관리계획(2023-2027) 수립 용역	하수도 중장기 경영관리 계획 수립 1식	18	㈜한국수도경영연구소	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
	용역	2023사업연도 수도사업특별회계 회계감사인 선정 및 회계감사	회계감사 1식	18	회계법인길인 제주지점	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
	용역	상하수도요금 ARS간편납부시스템 유지관리 용역	시스템 유지관리 1식	19	주식회사 케이알시스	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
	용역	2023 사업연도 하수도공기업특별회계 회계감사인 선임 및 회계감사	회계감사 1식	19	공인회계사장재호사무소	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
상수 도부	용역	원인자부담금 (용담이동) 상수도 시설사업 GIS DB구축 용역	GIS DB 구축용역 1식	15	(주)창인이엔지	지방계약법 시행령 25조
	용역	원인자부담금(외도이동) 상수도 시설사업 GIS DB구축 용역	GIS DB 구축용역 1식	19	(주)창인이엔지	지방계약법 시행령 25조
	용역	원인자부담금 (하귀1리 21-2번지 일원) 상수도 시설사업 실시설계 용역	실시설계용역 1식	18	(주)성광기술종합개발	지방계약법 시행령 25조
	용역	교래지구 외 1개소 전기공사(계장제어 포함) 실시설계용역	실시설계 1식	11	에이스엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	용역	동홍지구 배수지 확충공사 전기공사 폐기물처리용역	폐기물 처리 1식	10	동남산업 (주)	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	용역	교래지구 및 동홍지구 전기공사 재해예방 기술지도용역	재해예방 기술지도 1식	11	(주)한국전기 공사협회 안전기술원	지방계약법 시행령 25조
	공사	추자 상수원보호구역 울타리(휀스) 정비공사	울타리 철거 후 재설치 90경간 등	17	신안건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	수도정비기본계획(부분변경) 수립 및 신규정수장 개발사업 타당성 조사 용역	수도정비기본계획 부분변경, 신규정수장 타당성 조사 용역 1식	18	㈜도화 엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	공사	어음지구(애월복합) 4호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	18	(주)도현	지방계약법 시행령 25조
	공사	어음(애월복합) 3호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	19	(주)규성	지방계약법 시행령 25조
	공사	어음(애월복합) 2호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	19	(주)디케이엘	지방계약법 시행령 25조
	공사	상천지구 4호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	16	(주)웅지산업개발	지방계약법 시행령 25조
	공사	도련정수장 착수정 유량계반 설치 및 여과지 TM반 교체 설치공사	유량계반 설치 및 여과지 TM반 교체설치 1식	18	피앤씨(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천지구 1호, 삼양5호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	17	하지산업(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	표선(W-012),오등(D-133) 지하수 원상복구 공사	지하수 원상복구공사 1식	19	(주)디케이엘	지방계약법 시행령 25조
	공사	어음(애월복합)1,2,3,4호공 전기인입 지중관로 공사	전기인입 지중관로 공사 1식	20	(주)주성전기	지방계약법 시행령 25조
	공사	대포지구 4호지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	12	(주)워터제주	지방계약법 시행령 25조
	공사	오라5호(78-2)지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	12	재능엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	공사	강정정수장 소관시설물 감시시스템 정비공사	감시시스템 정비 1식	19	윤성제어 기술(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	교래지구 2호지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	16	(주)지엠씨	지방계약법 시행령 25조
	공사	광역 어음4호공 지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	15	(주)도현	지방계약법 시행령 25조
	공사	월평지구 지하수 원상복구 공사	지하수 원상복구공사 1식	20	(주)규성	지방계약법 시행령 25조
	공사	상수도 지하수관정 수위 측정관 정비공사	지하수관정 수위측정관 정비 1식	16	(주)웅지산업개발	지방계약법 시행령 25조
	공사	회수정수장 차염발생장치 정비 공사	차염발생장치 정비 1식	16	(주)하이클로	지방계약법 시행령 25조
	공사	광평가압장 및 상천지하수 수계전환 긴급공사	수계전환 긴급공사 1식	18	우남건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	상수도 지하수 관정 정비공사	지하수관정 정비 1식	12	(주)광지건설	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	공사	광역 회수 3호공 지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	18	(주)도현	지방계약법 시행령 25조
	공사	강정정수장 송수모터 개·보수 공사	송수모터 개보수공사 1식	20	재능엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	공사	구좌지구 3호 지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	12	(주)웅지산업개발	지방계약법 시행령 25조
	공사	한림정수장 내부 환경개선공사	환경개선공사 1식	10	보석건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	상하수도본부 취,정수장 출입문(자바라) 교체 설치공사 전원공사	출입문 교체공사 1식	15	호산전력	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천1가압장 및 남원정수장 밸브 교체공사	밸브 교체공사 1식	14	(주)장우	지방계약법 시행령 25조
	공사	한림정수장 배수지 방초용 보행매트 설치공사	보행매트 설치공사 1식	17	진형건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천1가압장 및 남원정수장 전동밸브 제어설비공사	밸브 제어설비공사 1식	19	㈜테크원 시스템	지방계약법 시행령 25조
	공사	상천지구 4호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	16	(주)지원이엔씨	지방계약법 시행령 25조
	공사	광역 금악 2호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	12	(주)디케이엘	지방계약법 시행령 25조
	공사	상수도 지하수 관정 수위 측정관 정비공사	지하수관정 수위측정관 정비 1식	14	(주)지엠씨	지방계약법 시행령 25조
	공사	어승생정수장 완속여과기 여과사 삭취공사	완속여과기 여과사 삭취 1식	18	성원건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	강정정수장 취수탑 유입밸브 및 색달1 배수지 자동제어 시스템 정비공사	자동제어시스템 정비공사 1식	14	두신기술	지방계약법 시행령 25조
	공사	교래지구 1호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	14	(주)규성	지방계약법 시행령 25조
	공사	어승생정수장 섬유상여과기 노후정비 공사	섬유상여과기 정비공사 1식	19	(주)그레넥스	지방계약법 시행령 25조
	공사	고성(F-485)지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	17	(주)도현	지방계약법 시행령 25조
	공사	광역 금악 1호공지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	11	재능엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	공사	광역 금악 2호공 지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	13	(주)웅지산업개발	지방계약법 시행령 25조
	공사	노형(노루생이) 1호공 지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	16	(주)지원이엔씨	지방계약법 시행령 25조
	공사	상하수도본부 소방시설 보수공사	소방시설 보수공사 1식	10	조은 이앤씨(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	애월지구 2호공 긴급 인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	19	(주)광지건설	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	공사	어음지구 3호공 지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비공사 1식	18	(주) 도현	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년 상수도부 소방안전관리 업무대행 용역	소방안전관리 업무대행용역 1식	16	조은 이앤씨(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년 강정정수장 수처리조 및 용흥가압장 배수지 청소	수처리조 및 배수지 청소 1식	20	한국위생방역	지방계약법 시행령 25조
	용역	도서지역 해수담수화시설 유지관리 및 기술진단 용역	해수담수화시설 유지관리 및 기술진단용역 1식	19	㈜청아 이엔지	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년 민오름배수지 외 10개소 무인경비용역 관리 대행 용역	무인경비 관리대행용역 1식	18	(주)에스원	지방계약법 시행령 25조
	용역	토평정수장 고도정수처리시설사업 기본 및 실시설계 설계경제성(VE) 검토 용역	설계경제성검토용역 1식	19	㈜열린 이앤씨	지방계약법 시행령 25조
	용역	조천정수장 고도정수처리시설사업 기본 및 실시설계 설계경제성 등 검토(VE)용역	설계경제성검토용역 1식	20	(주)씨엠누리	지방계약법 시행령 25조
	용역	강정정수장 외 7개소 울타리 정비공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	16	㈜길토목 설계사무소	지방계약법 시행령 25조
	용역	어승생정수장(서부간선) 송수관로 긴급복구공사 폐기물처리용역	폐기물처리용역 1식	10	(주)미래제주	지방계약법 시행령 25조
	용역	2022년 정밀안전점검결과 시설물 보수보강공사 실시설계 용역	실시설계용역 1식	14	㈜청풍 엔지니어링 건축사사무소	지방계약법 시행령 25조
	용역	서귀포시 상예수원지 취수량 급감에 따른 긴급 상수도 관로 연결공사 실시설계 용역	실시설계용역 1식	20	㈜길토목 설계사무소	지방계약법 시행령 25조
	용역	소규모 수도시설(남원지구) 상수도시설공사 GIS DB구축 용역	GIS DB 구축 용역 1식	17	(주) 이레정보	지방계약법 시행령 25조
	용역	소규모 수도시설 상수도시설공사 건설재해예방 기술지도용역	건설재해예방 기술지도용역 1식	12	제일 세이프티(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	농어촌생활용수 급수취약지역(한림지구) 상수도시설공사 폐기물처리용역	폐기물처리용역 1식	17	(주)청봉환경	지방계약법 시행령 25조
	용역	농어촌생활용수 급수취약지역(구좌지구) 상수도시설공사 GIS DB구축용역	GIS DB 구축 용역 1식	13	(주)에이오디	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	용역	소규모 수도시설 (우도지구) 상수도 시설공사 GIS DB 구축용역	GIS DB 구축 용역 1식	16	(주)에이오디	지방계약법 시행령 25조
	용역	서귀포시 상예수원지 취수량 급감에 따른 긴급 상수도 관로 연결공사 폐기물처리 용역	폐기물처리용역 1식	18	성진산업(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	농어촌생활용수 급수취약지역(대정지구) 상수도시설공사 GIS DB구축 용역	GIS DB 구축 용역 1식	16	제이아이엔시스템(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	농어촌생활용수 급수취약지역(대정지구) 상수도시설공사 폐기물처리용역	폐기물처리용역 1식	19	서귀포산업 (주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	추자정수장 해수담수화시설 개량·증설사업 기본 및 실시설계 설계경제성(VE) 검토 용역	설계경제성검토용역 1식	19	(주) 열린이앤씨	지방계약법 시행령 25조
	용역	농어촌생활용수 급수취약지역 상수도 시설공사 건설재해예방 기술지도 용역	건설재해예방 기술지도용역 1식	14	㈜에이원 세이프티	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년 강정정수장 수처리조 청소 및 삭취 용역	수처리조 청소 및 삭취 용역 1식	10	우리클린	지방계약법 시행령 25조
	용역	강정정수장 현대화사업 기본 및 실시설계 경제성 검토(설계VE) 용역	설계경제성검토용역 1식	19	(주) 무한리더스	지방계약법 시행령 25조
	용역	한림정수장 배출수처리시설 화학물질관리법 종합컨설팅 용역	화학물질관리법 종합컨설팅 용역 1식	18	㈜지엘 환경기술	지방계약법 시행령 25조
	용역	상수관로 비축자재 구입 및 운반용역	비축자재 구입 1식	20	(주)아람건설	지방계약법 시행령 25조
	물품	상수도 소독약품(정제소금) 구입 및 운반	소독약품 구입 1식	12	(주)탐라그린	지방계약법 시행령 25조
	물품	2023년 용흥가압장 정밀여과장치 마이크로 필터 구입	마이크로필터 구입 1식	19	㈜우성 워터테크	지방계약법 시행령 25조
	물품	마라담수장 RO설비 교체용 반투막 구입	반투막 구입 1식	20	㈜청아 이엔지	지방계약법 시행령 25조
	물품	삼양3수원지 고도정수처리시설 스케일방지제 구입	스케일방지제 구입 1식	18	칠성화학환경개발	지방계약법 시행령 25조
	물품	금악1,2호공지하수 긴급 정비공사용 수중케이블 구입	수중케이블 구입 1식	16	(주)한광	지방계약법 시행령 25조
	물품	강정정수장 침전지 말단 여과망 구입	여과망 구입 1식	18	㈜예성 리테일	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	물품	강정정수장 정수처리 약품 구입	정수처리약품 구입 1식	19	(주)칠성화학환경개발	지방계약법 시행령 25조
	물품	추자정수장 RO설비 B호기 고압펌프 모터 긴급교체	펌프모터 교체 1식	13	㈜청아 이엔지	지방계약법 시행령 25조
	물품	상수도 소독약품 (차아염소산나트륨, 정제소금) 구입 및 운반	소독약품 구입 1식	20	(주)칠성화학환경개발	지방계약법 시행령 25조
	물품	어승생정수장 원수탁도 수질자동측정기 제작설치	수질자동측정기 제작설치 1식	17	제이텍	지방계약법 시행령 25조
	물품	한림정수장 여과막(NF)세정(CIP) 및 예비품 구매	여과막 세정용품 구입 1식	19	효림 이엔아이(주)	지방계약법 시행령 25조
	물품	광역 금악 1,2,3,6호공 지하수 긴급보수용 소프트스타터 구입	소프트스타터 구입 1식	10	㈜테크원 시스템	지방계약법 시행령 25조
	물품	지하수 긴급인양 정비용 수중케이블 구입	수중케이블 구입 1식	16	가금산전	지방계약법 시행령 25조
	물품	상수도 지하수 소독용 약품 구입	소독약품 구입 1식	15	제이씨산업	지방계약법 시행령 25조
	공사	서림수원지 수목전정공사	수목전정공사 1식	16	정현토건(주)	지방계약법 시행령 제30조
	공사	서광수원 3호공 지하수 긴급인양정비 공사	긴급인양정비 1식	18	하지산업(주)	지방계약법 시행령 제25조
	공사	교래(돌박물관) 2호공 지하수 긴급인양정비 공사	긴급인양정비 1식	16	㈜지원이앤씨	지방계약법 시행령 제25조
	공사	납읍광역 3호공 지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비 1식	19	㈜규성	지방계약법 시행령 제25조
	공사	어음 F-530 지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비 1식	18	㈜디케이엘	지방계약법 시행령 제25조
	공사	교래지구 1호공 지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비 1식	14	㈜워터제주	지방계약법 시행령 제25조
	공사	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 RO설비 C호기 플러싱배관 및 펌프설치	펌프실치 1식	19	㈜청아이엔지	지방계약법 시행령 제30조
	공사	어승생정수장 완속여과4지 삭취공사	삭취공사 1식	14	성원건설(주)	지방계약법 시행령 제30조
	공사	도련(D-13)1호공 지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비 1식	14	㈜워터제주	지방계약법 시행령 제25조
	공사	사계(F-181)지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비 1식	13	㈜광지건설	지방계약법 시행령 제25조
	공사	남원(신흥)지구 1호공 지하수 긴급인양정비공사	긴급인양정비 1식	16	하지산업(주)	지방계약법 시행령 제25조
	공사	별도봉정수장 외 3개소 안전시설물 설치공사	안전시설물 설치 1식	17	㈜케이엘 에스	지방계약법 시행령 제25조
	공사	해안(F-535)지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비 1식	12	㈜지원이엔씨	지방계약법 시행령 제25조
	공사	납읍리 유량계 전송제어반 인입 전기공사	전기공사 1식	16	㈜산남전력	지방계약법 시행령 제25조
상수 도부	공사	상하수도본부 내 수목정비공사	수목정비 1식	17	정현토건(주)	지방계약법 시행령 제30조
	공사	어승생 농고지선 급수관로 개선공사	개선공사 1식	18	삼부포장 건설(주)	지방계약법 시행령 제30조
	공사	어음지구(애월복합)2호공 지하수 긴급 인양정비공사	긴급인양정비 1식	18	㈜지엠씨	지방계약법 시행령 제25조
	용역	강정정수장 내 수처리조 청소용역	청소용역 1식	13	다원기업	지방계약법 시행령 제25조
	용역	2023년 하반기 상수도 시설물 정기안전점검용역	정기안전점검용역 1식	13	㈜태신 엔지니어링건축사사무소	지방계약법 시행령 제25조
	용역	2023년 상수도부 사업장(취,정수장) 위험성평가 컨설팅 용역	컨설팅용역 1식	19	(사)대한산업안전협회 제주지회	지방계약법 시행령 제25조
	물품	지하수 긴급 공사용 수중모터 구입	수중모터구입 1식	18	㈜지원이엔씨	지방계약법 시행령 제25조
	물품	추자정수장 RO설비 C호기 펌프구입	펌프구입 1식	19	GJ엔지니어링	지방계약법 시행령 제30조
	물품	지하수 긴급 공사용 수중케이블 구입	수중케이블구입 1식	12	(주)한광	지방계약법 시행령 제25조
	물품	삼양3수원지 고도정수처리시설 스케일방지제 구입	스케일방지제 구입 1식	18	(주)칠성화학환경개발	지방계약법 시행령 제25조
	물품	상수도 질식사고 방지 송기마스크 구입	송기마스크 구입 1식	11	제주메디	지방계약법 시행령 제25조
	공사	남원표선 대블록 유량계 전송반(신계, 위미) 설치 전기공사	유량계 전송반 설치 전기공사 1식	17	㈜흥일전기	지방계약법 시행령 25조
	공사	2023 대흘(소블록)지구 누수처 긴급복구공사	누수처 복구공사 24건	18	우남건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	2023년 신흥(소블록)지구 누수처 긴급복구공사	누수처 복구공사 21건	14	㈜지에스건설	지방계약법 시행령 25조
	공사	대정안덕 대블록 외 1개소 유량계 전송반(동광, 표선) 설치 전기공사	유량계 전송반 설치 전기공사 1식	19	일출전기공사	지방계약법 시행령 25조
	공사	아라가압장 유입, 유출 유량계 전송반 설치 전기공사	유량계 전송반 설치 전기공사 1식	19	㈜영일전력	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천대블록 저수압지역 긴급 누수처 복구공사	누수처 복구공사 23건	17	호암건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	목석원 1, 2, 3호 PLC 정비 및 아라가압장 수위계 설치공사	수위계 설치 공사 1식	19	부일기업(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천읍 대흘리 감압변 긴급설치공사	감압변 설치 1개소	18	세영토건(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	대정안덕 소규모 유량, 수압 감시시스템 구축사업 실시설계용역	소규모 유량, 수압 감시시스템 구축 실시설계 1식	19	㈜길토목 설계사무소	지방계약법 시행령 25조
	용역	애월(소길블록) 노후상수도관 교체공사 GIS DB 구축 용역	GIS DB구축 용역 1식	17	㈜아성 공간정보	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	용역	제주시 조천읍 구 중블록 긴급 누수탐사 용역	조천읍 구 중블록 누수탐사 용역 1식	15	(주)서용 엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	용역	제주시 조천읍 신 중블록 긴급 누수탐사 용역	조천읍 신 중블록 누수탐사 용역 1식	17	㈜ 에이치앤텍	지방계약법 시행령 25조
	용역	판포리 외 1개소 급수취약지구 개선사업 실시설계용역	급수취약지구 개선사업 실시설계용역 1식	19	㈜해진 이앤씨	지방계약법 시행령 25조
	용역	아라가압장 유출유량계 외 7개소 전기공사 실시설계 용역	전기공사 실시설계 용역 1식	10	윤엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년도 상수관망 블록화시스템 유량 현장전송반 유지보수관리용역	현장전송반 유지보수 용역 1식	19	㈜테크원 시스템	지방계약법 시행령 25조
	용역	김녕사굴지구 상수관로 개선공사 GIS DB 구축 용역	GIS DB구축 용역 1식	13	㈜아성 공간정보	지방계약법 시행령 25조
	용역	김녕사굴지구 상수관로 개선공사 폐기물처리용역	폐기물처리용역 1식	10	흥남개발(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	한림한경 소규모 유량, 수압 감시시스템 구축사업 폐기물처리 용역	폐기물처리용역 1식	12	서귀포산업 (주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년 남원표선대블록 유량계 검교정 용역	유량계 검교정 30개소	14	㈜플로우 엔텍	지방계약법 시행령 25조
	용역	조천읍 신흥 소블록 긴급 누수탐사 용역	신흥소블록 긴급 누수탐사 용역 1식	19	㈜에이치앤텍	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년 읍면지역 상수도 시설 개선사업 실시설계 용역	상수도시설 개선사업 실시설계 용역 1식	19	㈜제이에스토목설계 사무소	지방계약법 시행령 25조
	용역	조천대블록 상수도시설 개선사업 실시설계용역	상수도시설 개선사업 실시설계용역 1식	19	(주)제이피엠	지방계약법 시행령 25조
	용역	봉개초교앞 노후 상수관로 교체공사 실시설계 용역	상수도관 D150, L=105m 노후상수도관 교체	19	㈜건화	지방계약법 시행령 25조
	용역	상수도 원격검침 통합관리시스템 G-클라우드 임차운영 용역	클라우드 임차운영 1식	10	(주)그렉터	지방계약법 시행령 25조
	용역	블록구축지역 상수도시설 개선사업 실시설계용역	실시설계 용역 1식	10	㈜해진 이엔씨	지방계약법 시행령 25조
	물품	남원표선 대블록 유량계 전송반(신계, 위미) 제작설치 구입	유량전송반 2면, 모니터링 시스템 보완 1식	19	피앤씨(주)	지방계약법 시행령 25조
	물품	대정안덕 대블록 외 1개소 유량계 전송반(동광, 표선) 제작설치	유량전송반 2면, 모니터링 시스템 보완 1식	19	㈜정우계전	지방계약법 시행령 25조
	물품	조천대블록 1,2공구 외 1개소 감압변 설치공사 감압밸브 구입	감압밸브 5개	14	㈜바램	지방계약법 시행령 25조
하수 도부	용역	남원하수처리장 노후차집관로 정비사업 전기 및 계측제어공사 (1공구) 재해예방 기술지도	재해예방 기술지도 1식	11	매일안전기술원(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	물품	성산3 하수관로 정비공사 (3공구_오조처리분구) 기계설비 관급자재 구매	스프르트펌프(5.5㎾) 2대	11	기산수기	지방계약법 시행령 25조 01항 05호 나목
	용역	오조리 하수관로 개선사업 GIS DB 구축 용역	GIS DB구축 1식	17	주식회사 지오트윈공간정보	지방계약법 제9조 및 시행령 제30조 1항 2호
	용역	성읍리 배수설비 정비공사 실시설계 용역	배부설비 조사 및 연막조사 1식	19	㈜한인엔지니어링	지방계약법 제9조 및 시행령 제30조 1항 2호
	용역	서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업 (2공구) 설계변경 경제성 검토(VE)용역	설계변경 경제성 검토(VE) 1식	18	㈜고려스마트기술정책연구소	지방계약법 시행령 25조 01항 05호 가목
	용역	색달하수처리장 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역	시설물 정기 및 정밀안전점검 1식	18	청풍엔지니어링건축사사무소	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	색달하수처리장 생물반응조 수질계측기기 유지관리 용역	수질계측기기 유지관리 용역 1식	11	제주환경과학	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구) 재해예방기술지도용역	재해예방기술지도 1식	17	(주)에이원세이프티	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	용역	제주특별자치도 도시침수에 따른 하수도정비 타당성조사 및 대책수립 용역(기본계획)	기본계획 수립 1식	19	동명기술공단	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	일도2동 및 대정읍 일원 하수도정비대책 및 기본계획 수립 용역	기본계획 수립 1식	19	㈜삼안	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	서귀포시 소규모 하수관로 정비사업 실시설계용역	실시설계 1식	19	㈜해오름엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	서귀포시 안덕면 사계리 배수설비 정비사업 전기공사	전기공사 1식	15	㈜대륜엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	서귀포시 안덕면 사계리 하수관로 정비공사 CCTV조사 및 수밀시험용역	CCTV조사 및 수밀시험 1식	16	제이앤제이특수개발(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
하수 도부	용역	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구,6차분) GIS DB구축용역	GIS DB구축 0.7km	12	㈜아성공간 정보	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계,2공구) 재해예방기술지도용역	산업재해 예방지도 72회	17	㈜에이원 세이프티	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계,3공구) 재해예방기술지도용역	산업재해 예방지도 72회	17	㈜에이원 세이프티	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	서부처리구역 하수관로 정비공사(2단계-하귀2리2공구) GIS DB 구축 용역	GIS DB구축 1식	10	㈜가온도시정보	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	용역	서부하수처리구역(저지·청수~판포간) 차집관로 정비사업 건설공사 산업재해 예방지도 용역	산업재해 기술지도 1식	16	제일세이프티㈜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계-2공구)건설공사 산업재해 예방지도 용역	산업재해 기술지도 1식	17	㈜제이제이안전	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	서부처리구역 하수관로 정비(2단계-1공구) 전기공사 재해예방 기술지도 용역	건설재해 기술지도 1식	11	㈜한국전기공사협회 안전기술원	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	한림 비양도 소규모 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	폐기물 처리 1식	19	이도에코제주(주)	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	제주시 건입동 외 2개소 소규모 하수관로 정비공사 실시설계 용역	실시설계용역 1식	19	㈜제이유엔지니어링	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	물품	제주하수처리구역 중계 및 간이펌프장 펌프제어용 자재(PLC) 구입	PLC 모듈 35개 구입	19	에이티씨테크	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	물품	제주하수처리구역 중계 및 간이펌프장 펌프제어용 자재(PLC) 구입	PLC 모듈 35개 구입	19	에이티씨테크	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	제주하수처리구역 도두중계펌프장 외 3개소 전기안전관리대행 용역	도두, 첨단, 외도, 용담중계펌프장 전기안전관리대행 1식	18	한라전기안전관리(주)	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	제주하수처리구역 병문중계펌프장 전기안전관리대행 용역	병문중계펌프장 전기안전관리대행 1식	14	대성전기안전관리	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
하수 도부	용역	제주하수처리구역 화북중계펌프장 외 1개소 전기안전관리대행 용역	화북, 삼양2중계펌프장 전기안전관리대행 용역 1식	19	㈜대한전기안전관리	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	제주하수처리구역 병문중계펌프장 노후 고압전동기제어반 교체공사 감리용역	고압전동기 제어반 교체 전기감리용역 1식	19	㈜윤엔지니어링	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주하수처리구역 차집관로 및 펌프장 비상자재 보관용 창고 신축 전기공사	창고 신축 전기공사 1식	19	주식회사 코지에너지	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주하수처리구역 펌프장 4개소 전기설비 보수공사	펌프장 전기시설물 보수 1식	11	주식회사에스엔이앤씨	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주하수처리구역 간이펌프장 6개소 계장제어시스템 보수공사	펌프장 원격제어시스템 보수 1식	15	에이티씨테크	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	제주하수처리구역 차집관로 및 펌프장 비상자재 보관용 창고 신축공사에 따른 우수유출저감대책 수립 용역	창고 신축에 따른 부지내 우수유출저감대책 수립 용역 1식	13	주식회사 더존이엔씨	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	화북, 삼양지역 하수펌프장 불명수(해수) 유입 CCTV조사 용역	화북, 삼양지역 하수펌프장 5개소 CCTV 촬영 조사 L=2,160m	19	제지앤제이특수개발주식회사	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	2023년도 제주시 하수 월류수 처리시설 유지관리(점검) 대행용역	월류수 처리시설 유지관리(점검) 1식	18	㈜피앤아이휴먼코리아	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	이도2 중계펌프장 차집관로 개량공사	차집관로(D300mm) L=23m 신설 1식	19	우남건설(주)	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	서회천도로변 오수펌프장 처리구역 차집관로 계량공사 폐기물처리 용역	폐기물처리 609ton, 폐기물운반 373㎥	16	주식회사청봉환경	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	서회천도로변 오수펌프장 처리구역 차집관로 개량공사 GIS DB구축 용역	GIS DB 구축 1식	19	㈜아성공간정보	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	도두중계펌프장 변전실 노후 바닥재 교체공사	도두중계펌프장 변전실 전도성 바닥재 교체 1식	10	주식회사 우신건재	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	물품	제주하수운영과 도두포구 및 신산마을 하수펌프장 수중펌프 구입	수중펌프 2대 구입	13	주식회사신성터보마스터	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
하수 도부	물품	제주하수운영과 초음파수위계 구입	초음파수위계 8Set 구입	19	유한회사 에코정화시스템	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	삼양2중계펌프장 전기실 노후 전도성 바닥재 교체공사	삼양2중계펌프장 변전실 전도성 바닥재 교체 1식	12	주식회사 우신건재	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주시 동지역 오수펌프장 기계설비 정비공사	제주시 동지역 일원 하수펌프장 노후 기계설비 정비 1식	19	푸른이엔지	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	물품	제주시 동지역 중계 및 간이펌프장 수위조절용 레이더수위계 구입	레이다수위계 4개 구입	19	주식회사 아진	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	삼양2중계펌프장 고압수전설비 보수공사	고압수전설비 보수 전기공사 1식	15	일출전기공사	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	화북, 삼양지역 하수펌프장 불명수(해수) 유입 맨홀 및 관로 보강 실시설계용역	하수펌프장 5개소 맨홀 및 관로 보강 실시설계용역 1식	19	주식회사 제이에스토목설계사무소	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주시 동지역 오수펌프장 전기설비 정비공사	전동기제어반 이설 1개소, 인입선 교체 4개소, 계량기 이설 2개소	16	㈜에스엔이앤씨	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주시 동지역 오수펌프장 계장설비 보수공사	레이다수위계 설치 4개소, 계장제어설비 개선 4개소	15	두신기술	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	동부하수처리장 중계펌프장 전기설비 개선공사 실시설게 용역	실시설게 1식 (원격제어반 교체 6개소, 비상발전기 설치 1개소)	15	㈜윤엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	물품	동부하수처리장 펌프장용 PLC 예비자재 구입	PLC 예비자재 구입 1식	14	두신기술	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	동부하수처리장 반응조 전등 및 분전반 교체공사	반응조 전등 교체 119개 및 분전반 교체 2개소	16	미래전력	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 가목
	용역	동부하수처리장 중계펌프장 전기설비 개선공사 감리용역	-원격감시제어반 (6개소) 교체공사 감리 1식 -비상발전기 360kW 1대 설치공사 감리 1식	18	㈜마루이엔지	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 가목
	공사	동부하수처리장 중계펌프장 원격감시제어반 교체공사	원격감시제어반 교체 통신공사 1식	18	㈜케이에스시스템	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 가목
	물품	동부하수처리장 펌프장용 PLC 예비자재 추가 구입	PLC 예비자재 구입 1식	11	두신기술	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
하수 도부	공사	동부하수(조천지1간이 및 동복중계) 펌프장 기계설비 교체공사	조천지1 간이펌프장 자동탈착장치 교체 동복중계펌프장 배관 교체	20	주식회사 지운	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	동부하수처리장 동복지2 간이펌프장 자동탈착장치 교체공사	동복지2 간이펌프장 자동탈착장치 교체	15	태경이엔씨 주식회사	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	동부하수처리장 중계펌프장(조천, 종달1) 펌프수리 및 기계설비 정비공사	조천중계 펌프수리 및 인양정비·계설비 정비 종달1중계 기계설비 교체	17	주식회사 탑	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	동부하수처리장 하수슬러지 운반·처리 용역	하수슬러지 95톤 운반·처리	20	주식회사 제이엔이	지방계약법 시행령 제25조 1항 1호
	용역	23년 동부, 서부하수처리장 반응조 수질계측기기 유지관리 용역	수질계측기기 유지관리 용역 1식	18	제주환경과학	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	동부하수처리장(함덕, 종달2) 중계펌프장 펌프수리 및 인양 정비공사	함덕중계펌프장 펌프수리 종달2중계펌프장 펌프수리 및 인양정비공사	17	주식회사 재도	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	동부하수처리장 생물반응조 송풍기 A호기 오버홀 정비	오버홀 정비 1식	15	㈜제왕터보텍	지방계약법 시행령 제25조 1항 4호 바목
	공사	동부하수처리장(신흥본1) 간이펌프장 수중펌프 교체	간이펌프장 수중펌프 교체 1식	11	주식회사 용천	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	동부하수처리장 평대중계펌프장 토출배관 밸브 교체공사	펌프토출배관 3개소 정비	18	다성기업 주식회사	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목
	공사	동부하수처리장 중계펌프장 초음파수위계 이설 및 이중화 구축 공사	초음파수위계 이설(6개소) 및 이중화 구축(9개소) 공사 1식	14	두신기술	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 가목
	용역	2023년 서부하수처리장 전기안전관리대행용역	안전관리대행용역 1식	17	한라전기안전관리 (주)	지방계약법 시행령 제25조 1항,제30조 1항
	공사	서부 하수처리 구역 라신·애월중계펌프장 체크밸브 교체 공사	체크벨브 교체공사 1식	14	(주)장우	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	서부 하수처리 구역 애월3간이펌프장 기계시설물 교체 공사	기계시설물 교체공사 1식	11	한영	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	서부하수처리구역 옹포중계펌프장 기계설비 교체 공사	기계설비 교체공사 1식	18	(주)우성기계	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
하수 도부	공사	서부하수처리구역 애월중계펌프장 탈취설비 보수 공사	탈취설비 보수공사 1식	19	한수이앤씨	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	서부하수처리장 반응조(5~8지)기계실 조명기구 교체 공사	조명기구교체공사 1식	12	(주)대산	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	서부하수처리구역 금능중계펌프장 기계설비 교체공사	기계설비 교체공사 1식	10	대영기업	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	서부하수처리장 전동용 제수밸브 및 부싱 수리	벨브 및 부싱 수리 1식	12	덕성벨브	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	서부하수처리구역 곽지중계펌프장 탈취설비 보수 공사	탈취설비 보수 1식	19	삼다이앤지	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	서부하수처리구역 중계펌프장 CCTV 내부 이전설치 공사	CCTV이전설치공사 1식	13	올레전자	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	물품	서부하수처리구역 간이펌프장 레이더수위계 구입	레이더수위계 구입 1식	14	네오비젼	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	물품	서부하수처리장 재이용시설 마이크로 필터 하우징 구매설치	마이크로필터 구매 1식	16	(주)한국멤코	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	서부 하수처리구역 애월·금능중계펌프장 수중펌프 수리	수중펌프 수리 1식	18	(주)현대수중펌프	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	용역	2023년 서부하수처리장 중계(애월,곽지)펌프장 탈취설비 유지관리 용역	유지관리 용역 1식	13	테일환경관리(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항, 제30조 1항
	용역	서부하수처리장 산기관 및 노후시설 교체공사 실시설계용역	실시설계 용역 1식	19	한결이앤씨	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	공사	서부하수처리장 원심탈수기(B호기) 정밀 정비공사	탈수기 정밀 정비 1식	19	이화에코시스템	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	공사	서부하수처리장 반응조 송풍기 정비공사	송풍기 정비공사 1식	19	제왕터보텍	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	물품	서부하수처리장 UV소독설비 소모품 구입	UV소독설비 구입 1식	19	코레드	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	용역	서부하수처리장 사설항로표지(등부표) 유지관리용역	유지관리용역 1식	11	마린테크	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
하수 도부	용역	곽지중계펌프장 차집(압송)관로 이설공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	19	제이피엠	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	공사	서부하수처리장 사설항로표지(등부표) 인양 및 교체공사	인양 및 교체공사 1식	19	마린테크	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	물품	서부하수처리장 사설향로표지(등부표)유지관리 자재 구입	자재 구입 1식	19	오션개발(주)	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	물품	서부 하수처리구역 미수중계펌프장 수중펌프(37KW) 구입	수중펌프(37KW) 구입 1식	17	주식회사 신성터보 마스터	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조
	용역	2023년 서부하수처리장 시설물 정기안전점검 및 정밀안전점검 용역	유지관리 용역 1식	19	태신엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	용역	보목하수처리장 전기안전관리대행용역	전기안전관리 대행 용역 1개소(보목처리장)	14	남부전기기술단	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	자구리중계펌프장 외 1개소 전기안전관리대행용역	전기안전관리 대행 용역 2개소(자구리,솜반천중계펌프장)	15	(주)대경엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	23년 서귀중계펌프장 외 4개소 전기안전관리대행용역	전기안전관리 대행 용역 5개소(보목1,보목2,서귀,정방중계펌프장,호근위생처리장)	10	G&T	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	보목하수처리장 사설항로표지 등부표 유지관리용역	등부표 유지관리 2기	11	마린테크	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	보목하수처리장 노후 건축믈 정비공사 설계용역	노후건축물 정비공사 설계용역 1식	17	건축사사무소 지인건축	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	보목하수처리장 원심탈수기 A호기 오버홀 정비공사	원심탈수기 오버홀 정비공사 1식	18	㈜대운테크	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 가목
	공사	보목하수처리장 자구리중계펌프장 수중오수펌프(C호기)수리공사	오수펌프 수리 1식	19	㈜푸른이엔지	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 가목
	용역	보목하수처리장 전기설비 개선에 따른 실시설계용역	전기설비 개선 설계용역 1식	14	우리기술단(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	23년 보목하수처리장 시설물 정밀 및 정기 안전점검용역	시설물 정기안전점검 용역 1식	19	주식회사 천우건설	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	물품	보목하수처리장 차아염소산나트륨 단가구입	차아염소산나트륨 36,000kg구입	19	육일화공약품	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
하수 도부	공사	보목하수처리장 UV소독 설비 소모품교체 공사	UV소독설비 소모품 1식	19	도림이엔지 주식회사	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 가목
	공사	강정1중계펌프장 스크류컨베이어 제작 및 설치공사	스크류컨베이어 공사 1식	18	성진	지방계약법 시행령 제25조 1항 4호 타목
	용역	색달하수처리장 외 3개소 전기설비 안전관리대행용역	처리장 외 3개소 (강정, 법환, 월평) 전기설비 안전관리대행용역 1식	19	G&T	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	대포중계펌프장 외 4개소 전기설비 안전관리대행용역	대포중계 외 4개소 (혁신도시, 성천포, 중문동부, 신시가지) 전기설비 안전관리 대행용역 1식	19	주식회사 대신엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	색달하수처리장 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역	시설물 정기 및 정밀안전점검 1식	18	청풍엔지니어링건축사사무소	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	색달하수처리장 생물반응조 수질계측기기 유지관리 용역	수질계측기기 유지관리 용역 1식	11	제주환경과학	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	물품	색달하수처리장 탈취기 약품 구입	아큐사이드100A :2,200kg 아큐사이드100B :2,900kg	17	㈜더존이엔티	지방계약법 시행령 25조 01항 05호 나목
	공사	대정하수처리장 대정5중계펌프장 비상발전기 설치 전기공사	비상발전기 175kw 설치 전기공사 1식	13	㈜대일씨엠	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 안덕3중계펌프장 노후밸브 교체공사	덕3펌프장 밸브류 교체C호기(200A),완폐식체크밸브 및 후렉시블 1대 교체	14	신성이엔씨	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 무릉리 해안도로 차집관로 보수공사 시행	오수관로 보수 1식	11	㈜남현건설	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 원심탈수기 B호기 OVERHAUL 수리	원심탈수기 B호기 OVERHAUL 수리 1식	19	㈜플루엔	지방계약법 시행령 제25조
	물품	대정하수처리장 방류조 UV램프 구입	방류조 UV램프 구입 1식	19	㈜디엠엔텍	지방계약법 시행령 제25조
	물품	대정하수처리장 대정9중계펌프장 및 위생처리장 탈취기 약품 구입	탈취기 약품 구입 1식	19	㈜더존이엔티	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 생물반응조(1차) 노후 전기배선 교체 공사	반응조 1~4지 노후 배선교체 1식	19	신우건설	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 모래여과기 유량계 교체공사	모래여과기 유량계 교체 1식	11	㈜에이치에스씨엠티	지방계약법 시행령 제25조
하수 도부	공사	대정하수처리장 협잡물컨베이어 수선 공사	침사지 협잡물켠에이어 수리 1식	19	㈜가온텍	지방계약법 시행령 재25조
	공사	대정하수처리장 대정5중계펌프장 비상발전기 설치 전기공사	비상발전기 175kw 설치 전기공사 1식	12	㈜대일씨엠	지방계약법 시행령 제25조
	용역	남원하수처리장TMS실 데이터로거 교체	데이터로거 교체 1식	12	제이텍	지방계약법 시행령 제25조5호(1인견적)
	물품	남원하수처리장 표선9간이펌프장 오수 수중펌프 구입	오수수중펌프 (SKTC3.7T,80mm,0.7㎥/min,8mH,3.7㎾)	16	한국펌프공업협동조합	지방계약법 시행령 제25조1항6호라목 6항
	물품	남원하수처리장 초음파수위계 구입	LT-200	12	대호계전	지방계약법 시행령 제25조5호(1인견적)
	물품	남원하수처리장 PLC 통산 자재 구입	아날로그모듈 외 2종	13	대호계전	지방계약법 시행령 제25조5호(1인견적)
	공사	남원하수처리장 원격감시제어 및 중계, 간이펌프장 프로그램 개량	프로그램 개량	19	㈜코리아파워	지방계약법 시행령 제25조5호(1인견적)
	공사	남원하수처리장 표선3중계펌프장 밸브류 및 토출배관 교체	토출스텐배관 교체	18	하나기업주식회사	지방계약법 시행령 제25조5호(1인견적)
	용역	2023년 성산하수처리장 자가용 전기설비 전기안전관리대행용역	설비용량 1,563kw	17	㈜대신엔지니어링	지방계약법시행령 제25조 및 제30조
	용역	2023년 성산하수처리장 시설물 정기 및 정밀안전점검용역	시설물 정밀안전점검 및 정기안전점검	17	주식회사 태신엔지니어링	지방계약법시행령 제25조 및 제30조
	공사	성산하수처리장 원심탈수기철거공사	신규원심탈수기배관1식, 기존원심탈수기철거 2대	17	하나기업 주식회사	지방계약법시행령 제25조 및 제30조
	공사	성산하수처리장 풋살구장 인조잔디철거공사	인조잔디포장철거 800㎡, 휀스철거 1.8㎡	19	주식회사 아인산업	지방계약법시행령 제25조 및 제30조
	공사	성산하수처리장 원격감시시스템 네트워크 설비이중화개량공사	원격감시시스템 네트워크 설비이중화설치 1식	18	주식회사 테크원시스템	지방계약법시행령 제25조 및 제30조
	물품	성산하수처리장 초음파수위계 구입	초음파수위계 8세트 구입	19	㈜우리기술	지방계약법시행령 제25조 및 제30조
	공사	성산2중계펌프장 차집관로 긴급복구공사	차집관로 긴급복구 1식	18	하지산업(주)	지방계약법시행령 제25조 및 제30조
	공사	제주시 추자도 소규모 공공하수처리시설 분리막 설치 및 막세정 작업	소규모 공공하수처리시설 분리막 세정 3개소	18	㈜오라	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
하수 도부	공사	제주시 추자도 소규모 공공하수처리시설 정비공사	소규모 공공하수처리시설 정비 1식	19	㈜에코파워텍	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	제주시 추자도 소규모 하수처리시설 환경정비공사	환경정비공사 1식	16	유창기업(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	우도면 소규모 공공하수처리시설 악취저감 식재공사	악취저감 식재공사 1식	19	㈜상지그린테크	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	대정하수처리장 반응조 1~4지 약품배관 교체 공사	반응조 1-4지 약품배관 교체 1식	16	㈜더존이엔티	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 무릉리 해안도로 차집관로 보수공사	오수관로 보수 1식	10	㈜남현건설	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 반응조 5지 분배조 유출밸브 교체 공사	반응조 5지 유츌밸브 교체 1식	19	푸른이엔지	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 신평1맨홀펌프장 외 2개소 초음파 수위계 설치공사	초음파수위계 설치공사 2개소	16	㈜코리아파워	지방계약법 시행령 제25조
	용역	남원하수처리장 탈취설비 유지관리용역	탈취설비 유지관리 1식	19	태일환경 관리(주)	지방계약법 시행령 제25조5호
	용역	남원하수처리장 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역	시설물 정기 및 정밀안전점검 1식	15	㈜청풍 엔지니어링 건축사사무소	지방계약법 시행령 제25조5호
	용역	남원하수처리장 분배조 전동밸브 설치공사	분배조 유출 전동밸브 4대 설치(Φ400㎜)	19	주식회사 한국공조 시스템	지방계약법 시행령 제25조5호
	용역	남원하수처리장 반응조(제3지) 산기관 보수공사	산기관 보수 및 멤브레인 교체 1식	11	대성하이테크	지방계약법 시행령 제25조5호
	공사	성산하수처리장 풋살구장 안전보호대 설치공사	안전보호대설치 1식	12	㈜무한씨앤에스	지방계약법시행령 제25조 및 제30조
현대화 추진단	용역	2023년 제주하수처리장 시설물 정기안전점검 용역	정기안전점검(상반기) 1식, 정기안전점검(하반기) 1식	12	㈜태신 엔지니어링	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 북측 옹벽 절개지 조경공사	초화류, 관목류 식재 및 전정작업 1식	18	㈜자연제주	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 UV소독설비 소모품교체보수 공사	UV소독설비 보수 1식	18	도림이엔지 주식회사	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 침사 세정장치 스크류 임페라 교체 공사	침사 세정장치 스크류 임페라 교체 1식	15	주식회사 탑	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
현대화 추진단	용역	제주하수처리장 탈취설비 유지관리용역	탈취설비 유지관리 1식	19	태일환경관리 주식회사	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 탈취설비 정비공사	탈취설비 정비 1식	17	주식회사 한수이앤씨	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	용역	제주하수처리장 수질계측기기 유지관리용역	수질계측기기 유지관리 1식	18	제이텍	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 구입(1차)	무기응집제 (저염기도 PAC)구입 1식	17	주식회사 비봉케미칼	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 구입(2차)	무기응집제 (저염기도 PAC)구입 1식	17	주식회사 비봉케미칼	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 구입(3차)	무기응집제 (저염기도 PAC)구입 1식	17	(주)이 에프 티	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 구입(4차)	무기응집제 (저염기도 PAC)구입 1식	17	(주)이 에프 티	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 구입(5차)	무기응집제 (저염기도 PAC)구입 1식	17	주식회사 코솔텍	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 무기응집제(저염기도 PAC) 구입(6차)	무기응집제 (저염기도 PAC)구입 1식	17	주식회사 코솔텍	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 유입동 침사저장고 제작설치	유입동 침사저장고 제작설치 1식	19	주식회사 라산건업	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 잉여가스 공급 송풍기 제작 설치	잉여가스 공급 송풍기 1대	14	주식회사 하크	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 유입동 계단식스크린 B호기 정비공사	유입동 계단식스크린 정비 1식	17	주식회사대승엔지니어링	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 생물반응조 안전시설물 정비공사	생물반응조 안전시설물 정비 1식	19	행운기업(주)	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 입축사류펌프(유입펌프 E호기) 긴급수선공사	유입펌프 정비 1식	19	주식회사 지운	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	건설기계 25.5톤 덤프트럭 적재함 보강	덤프트럭 적재함 보강 1식	19	외도공업사	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	용역	2023년 제주하수처리장 전기설비 전기안전관리대행 용역	전기안전관리대행 1식	17	(주)썬텍제주	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
현대화 추진단	물품	제주하수처리장 탈수케익 이송설비 교체용 예비 스테이터구입	스테이터 구입 1대	10	모나스펌프㈜	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 탈수케익 이송설비용 예비 스테이터구입	스테이터 구입 1대	10	모나스펌프㈜	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 원심탈수기 A호기 정비공사	원심탈수기 정비 1대	19	(주)로얄정공	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	제주하수처리장 송풍기 계전기 오작동 방지용 고조파필터 수리	고조파필터 수리 1식	19	(주)에코파워텍	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 2단계 초침 슬러지수집기C 스컴스키머 긴급수선공사	슬러지수집기 정비 1식	11	주식회사 동아기업	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 케익이송장치 (스크류컨베이어) 정비공사	캐악이송장치 정비 1식	15	주식회사 한영이엔지	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호

❍ 2023년 2천만원 이상 5천만원 미만

(단위 : 백만원)

부서명	구분	사업명	사업개요	사업비	업체명	사유
경영관리과	용역	상하수도 요금관리 프로그램 유지관리 용역	상하수도 요금관리 프로그램 유지관리 용역1식	44	㈜한일아이앤씨	지방계약법 시행령 25조
	용역	수도사업특별회계 통합회계관리 프로그램 유지관리 용역	수도사업특별회계 통합회계관리 프로그램 유지관리 용역 1식	24	㈜대양컴퓨터정보	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	공사	상수도시설사업(와산지구) 전기공사	전기공사 1식	49	혁신전력	지방계약법 시행령 25조
	용역	교래지구 전기공사 감리용역	감리용역 1식	45	㈜마루이엔지	지방계약법 시행령 25조
	공사	남원 및 하례지구 대체취수원 개발사업 제어반 설치 전기공사	대체취수원 개발(2개소)에 따른 전기인입공사 1식	38	(주)지이전기	지방계약법 시행령 25조
	공사	하례 대체취수원 송수관로 시설공사	송수관로(D150) L=54m 시설 1식	38	제이앤제이특수개발(주)	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	용역	외도수원지 외 2개소 상수원보호구역 일부 해제 용역	상수원 보호구역 해제용역 1식	44	(주)산들엔	지방계약법 시행령 25조
	공사	동홍배수지 방초용 보행매트 설치공사	보행매트 설치 1식	43	아침조경	지방계약법 시행령 25조
	공사	광령배수지 가압펌프 긴급 설치공사	펌프 설치공사 1식	29	(주)도현	지방계약법 시행령 25조
	공사	광령배수지 가압펌프 기동반 긴급 제작 설치	기동반 제작설치 1식	35	(주)테크원시스템	지방계약법 시행령 25조
	공사	추자면 신양리 일원 상수도 긴급복구공사	상수도 긴급복구공사 1식	46	유창기업(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	금악정수장 차염주입펌프 긴급 교체 공사	펌프 교체 1식	23	(주)하이클로	지방계약법 시행령 25조
	공사	상귀(D-136)지하수 수질개선공사	지하수 수질개선공사 1식	35	㈜정 이노베이션	지방계약법 시행령 25조
	공사	도련정수장 사택 보수보강 공사	사택 보수보강공사 1식	46	(주)디자인 그림	지방계약법 시행령 25조
	공사	한림정수장 송수관로 긴급복구공사	관로 긴급복구공사 1식	31	운암건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	어승생정수장(동부간선) 송수관로 긴급복구공사	관로 긴급복구공사 1식	44	운암건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	봉개2호배수지 외 2개소 배수지 철거공사	배수지 철거 1식	48	(주)에코제주	지방계약법 시행령 25조
	공사	정수장 및 배수지 6개소 차염소독설비 정비공사	차염소독설비 정비 1식	29	(주)하이클로	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년 상수도부 소관 정수장(15개소) 방역소독 용역	소관 정수장 방역소독 용역 1식	49	벨킨스	지방계약법 시행령 25조
	용역	취·정수장 노후 수배전반(제어반) 교체 및 비상발전기 설치 전기공사 실시설계 용역	실시설계 용역 1식	32	(주)제이렉	지방계약법 시행령 25조
	용역	외도 산지천 생태하천복원사업 모니터링용역(2차)	모니터링용역 1식	47	㈜영아리 환경기술	지방계약법 시행령 25조
	용역	삼양1,2수원지 노후 수배전반 교체 전기공사 감리용역	전기공사 감리용역 1식	49	(주)고산전력	지방계약법 시행령 25조
	용역	봉개2호배수지 외 2개소 배수지 철거공사 폐기물처리용역	폐기물처리용역 1식	26	이도에코표선 (주)	지방계약법 시행령 25조
	물품	2023년 상수도 생산관리과 관용차량 (2톤구동픽업트럭) 구입	관용차량 구입 1식	24	현대자동차(주)	지방계약법 시행령 26조
상수 도부	물품	추자정수장 RO설비 A호기 RO멤브레인 긴급교체	RO멤브레인 교체 1식	47	(주)아쿠아지노텍	지방계약법 시행령 25조
	공사	상모리 3624-3번지 상수도 시설물(배수지) 철거공사	철거공사 1식	22	(주)아람건설	지방계약법 시행령 제30조
	공사	광령배수지 옥상사다리 제작 및 설치공사	옥상사다리 제작 및 설치 1식	33	㈜성혁 하우징	지방계약법 시행령 제30조
	공사	서홍배수지 주변 송수관로 긴급보수공사	긴급보수공사 1식	39	신이건설(주)	지방계약법 시행령 제30조
	공사	애월지구 1호공 지하수 원상복구 긴급공사	긴급공사 1식	44	(주)도현	지방계약법 시행령 제30조
	용역	2023년 취,정수장 염소투입기 유지관리용역	유지관리용역 1식	30	㈜제이텍 워터	지방계약법 시행령 25조
	용역	오라가압장 노후 수배전반 교체 전기공사 감리용역	전기공사 감리용역 1식	32	(주)제이렉	지방계약법 시행령 25조
	물품	서광정수장 비상발전기 설치 전기공사 자재 구입	자재구입 1식	36	류소방	지방계약법 시행령 25조
	물품	지하수 긴급 공사용 수중모터 구입	수중모터 구입 1식	43	(주)광지건설	지방계약법 시행령 제30조
	공사	2023년 조천 대블록 긴급 누수처 복구공사(1차)	누수처 복구공사 60건	33	마성토건(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천 대블록 급수취약지구 긴급개선공사	상수관로 D80 L=101.5m, 맨홀뚜껑 교체 1식	47	운암건설㈜	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천대블록 2공구 감압변 긴급설치공사	감압변 설치 4개소	46	㈜아람건설	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천대블록 1공구 감압변 긴급설치공사	감압변 설치 4개소	48	마성토건(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	목석원~아라배수지 시설개선 지하수 인양정비공사	지하수 인양설치(펌프교체) 2개소	48	㈜도현	지방계약법 시행령 25조
	공사	신촌 소블록 누수다발관 긴급시설 개선공사	배수관로 D30 L=379m	27	재은건설산업(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	봉개초등학교 앞 노후 상수관로 교체공사	배수관로 D150 L=105m	31	(주)예성건설	지방계약법 시행령 25조
	공사	2023년 하귀2소블록 누수다발관 긴급 교체공사	누수다발관 교체 (D15~D40, L=202m)	37	유진토건(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	2023년 조천대블록(4차) 누수처 긴급복구공사	누수처 복구 38건	40	(주)아람건설	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	용역	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사 실시설계 용역	송수관로 D150~D250 L=1.73㎞ 신설	44	㈜인트랜	지방계약법 시행령 25조
	용역	애월(소길블록) 노후상수도관 교체공사 폐기물처리용역	폐기물처리용역 1식	27	서광산업(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	2023년 구좌읍 송당리 상수도관 개선공사 실시설계 용역	실시설계용역 1식	29	(주)인트랜	지방계약법 시행령 25조
	용역	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사 GIS DB구축용역	GIS DB 구축 1식	30	(주)지오트윈공간정보	지방계약법 시행령 25조
	용역	목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사 폐기물처리 용역	폐기물 처리 1식	47	이도에코 제주(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사 페기물처리용역	폐기물 처리 1식	40	이도에코 제주(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	송당리 마을안길 노후상수관로 교체공사 GIS DB 구축용역	GIS DB 구축 1식	34	(주)글로베이	지방계약법 시행령 25조
	용역	조천소블록(소공원) 상수관망 긴급개선공사 GIS DB 구축용역	GIS DB 구축 1식	26	(주)글로베이	지방계약법 시행령 25조
	물품	상수도 관망 감압밸브 부속설비(시간설정 이중제어) 제작설치	감압밸브 부속설비 10개소	37	(주)바램	지방계약법 시행령 25조
	물품	목석원1호 지하수 관정 계장제어장치 제작설치	계장제어장치 설치 1식	40	(주)정우계전	지방계약법 시행령 25조
하수 도부	용역	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구) 폐기물처리용역	폐기물 처리 1식	20	㈜한라환경산업	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	물품	성산3 하수관로 정비공사(2공구) 2023년 시행분 수중펌프	수중펌프 6대	28	한국펌프공업협동조합	지방계약법 시행령 제25조 1항 6호 라목
	용역	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구) CCTV 조사 및 수밀시험용역	CCTV조사 1식	35	㈜효경건설	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	용역	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구) 폐기물처리 용역	폐기물처리 1식	33	성진산업 주식회사	지방계약법 시행령 제25조 3항 2호
하수 도부	공사	색달하수처리장 천제연중계펌프장 압송관로 긴급 연장공사	압송관로 연장 L=205m(DCIP 주철관 D150mm)	45	와이케이건설	지방계약법 시행령제25조 1항 5호 가목
	용역	색달하수처리장 수처리용 여과설비 교체공사 실시설계 용역	실시설계용역 1식	44	㈜인트랜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	용역	대정하수처리구역 불명수 유입 조사용역(연막시험)	연막조사 16km	48	정진건설㈜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	공사	서귀포시 대정읍 하모리 소규모 하수관로 정비공사	하수관로 정비 L=47m	46	덕운건설㈜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	용역	안덕면 사계리 하수관로 정비사업 폐기물처리용역	폐기물처리 1식	32	한라환경산업㈜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	용역	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구,6차분) CCTV 조사 및 공기압시험용역	CCTV조사 0.7km 등	21	강산토건(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	용역	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구,6차분) 혼합폐기물 처리용역	혼합폐기물 처리	25	한라환경산업	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	용역	남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계,2공구) CCTV조사용역 및 수밀시험용역	CCTV조사 2km 등	42	마성토건	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	용역	남원공공하수처리시설 증설사업 준공식대행용역	준공식 행사대행 1식	28	제주늘푸른	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	용역	연동.노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비공사(노형1공구) GIS DB구축 용역	GIS DB구축 1식	41	강산토건㈜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	공사	2023년 상반기 제주시 동지역 중계 및 소규모 펌프장 준설공사	준설량 120㎥, 폐기물처리량 120ton	42	주식회사 주현건설	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호가목
	공사	비상자재 보관용 창고 및 외도중계 펌프장 호이스트 설치 공사	비상자재 보관용 창고 호이스트 신설(5ton), 외도중계펌프장 호이스트 추가 설치(2ton)	47	주식회사 으뜸이엔지	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호가목
	공사	월대펌프장 불명수(해수) 유입에 따른 하수관로 정비공사	오수관 교채(D300mm, L29m), 기존관 철거(D200mm, L18m)	29	유한건설 주식회사	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호가목
하수 도부	공사	제주시 동지역 하수시설물 정비공사	노후배관 4개소, 자동탈착장치 3개소, 배관지지대 1개소 교체	34	주원솔루션 주식회사	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호가목
	공사	2023년 하반기 제주시 동지역 하수펌프장 준설공사	제주시 동지역 하수펌프장 26개소	43	백연건설 주식회사	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호가목
	공사	병문중계펌프장 수중사류펌프 A호기 수리	수중펌프 수리	45	삼진공업(주)	지방계약법 시행령 제25조제1항제4호바목
	공사	동김녕 중계펌프장 비상발전기 설치공사	비상발전기 설치 전기공사 1식	25	㈜정광전력	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 가목
	공사	2023년 하반기 동부하수처리장 중계 및 간이펌프장 준설공사	준설(80㎥) 및 폐기물처리(40ton)	29	기완건설 주식회사	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 마목
	용역	23년 동부하수처리장 노후 차집관로 CCTV 조사용역	조천읍, 구좌읍 일원 차집관로 CCTV 촬영 조사	42	삼호건설주식회사	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	물품	서부하수처리장 중앙제어실 원격감시시스템 네트워크 설비 구입 설치	네트워크 설비 구입 1식	49	바오산업	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하 물품(여성기업)
	공사	제주시 추자도 소규모 공공하수처리시설 보수공사	소규모 공공하수처리시설 보수 1식	47	대운토건(주)	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	공사	제주시 동부위생처리장 탈수기 수리	탈수기 수리 1식	45	㈜유천엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 4호 바목
	공사	제주시 우도면 및 서귀포시 소규모 공공하수처리시설 준설공사	하수처리시설 준설공사 1식	29	혜명환경건설(주)	지방계약법 시행령 제25조, 제30조
	공사	제주위생처리장 종합협잡물처리기 드럼스크린 수리	협잡물 처리기 수리 1식	38	동진기공	지방계약법 시행령 제25조 1항 4호 바목
	공사	보목하수처리장 수처리동 공기압축기 개선에 따른 전기공사	공기압축기 개선에 따른 전기공사 1식	28	주식회사 정광전력	지방계약법 시행령 제25조 5호(1인견적) 여성기업
	물품	자구리 중계펌프장 외 3개소 탈취기 약품 구입	아큐사이드100A 4,000kg 아큐사이드100B 4,000kg 가성소다4.5%2,900kg 촉매반응기:4개	45	더존이엔텍	지방계약법 시행령 제25조 5호(1인견적) 장애인기업
	공사	보목하수처리장 펌프장 준설공사	준설량(170.34㎥) 폐기물처리(55톤)	35	주식회사 주현건설	지방계약법 시행령 제25조 5호(1인견적) 여성기업
하수 도부	공사	색달하수처리장 천제연중계펌프장 압송관로 긴급 연장공사	압송관로 연장 L=205m(DCIP 주철관 D150mm)	45	와이케이건설	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 가목
	공사	색달하수처리장 총인약품설비 개선사업	총인약품설비 개선공사 1식	47	한성이엔지 (주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	물품	색달하수처리장 탈취기 약품 및 소모품 구입	탈취기 약품 및 소모품 구입	45	더존이엔텍	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	용역	색달하수처리장 수처리용 여과설비 교체공사 실시설계 용역	실시설계용역 1식	44	㈜인트랜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	공사	대정하수처리장 유입펌프장 이중화 PLC 교체공사	유입펌프장 이중화 PLC 교체 1식	49	㈜테크원시스템	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 맨홀펌프장 초음파 수위계 납품 설치	신도1맨홀펌프장외4개소 초음파 수위계 납품 설치	27	바오산업	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	공사	대정하수처리장 유입펌프장, 안덕3중계펌프장 노후밸브 교체공사	A,C호기(250A),E호기(300A) 완폐식체크밸브 및 후렉시블조인트외 교체 안덕3중계펌프장 전동밸브 A,B호기(200A) 2대 교체	44	대흥공영㈜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	공사	대정하수처리장 맨홀펌프장 노후 PLC 교체	맨홀펌프장 TM/TC반 개량 1식	26	테크원시스템	지방계약법 시행령 제25조
	공사	대정하수처리장 대정9중계펌프장 비상발전기 설치 전기공사	비상발전기 교체 및 설치 전기공사 1식	41	가람전력(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	공사	대정하수처리장 태양광발전설비 전기공사	태양광발전설비(50KW) 설치 1식	28	㈜지이전기	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	물품	남원하수처리장 탈수기 유기고본부응집제 조달 구입	응집제 5,500kg	20	에스엔에프 코리아	지방계약법 시행령 제25조 1항 6호 라목6
	물품	남원하수처리장 탈수기 유기고본부응집제 조달 구입	응집제 6,000kg	21	에스엔에프 코리아	지방계약법 시행령 제25조 1항 6호 라목6
	물품	남원하수처리장 탈수기 유기고본부응집제 조달 구입	응집제 5,500kg	23	에스엔에프 코리아	지방계약법 시행령 제25조 1항 6호 라목6
	물품	남원하수처리장 분배조 전동밸브 설치공사 관급자재 구입	전동밸브 및 신축관	28	주식회사 삼진정밀	지방계약법 시행령 제25조 1항 6호 라목6
하수 도부	용역	2023년 남원하수처리장 자가용전기설비 안전관리대행	남원하수처리장 외 4개소	20	㈜대경엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	물품	남원하수처리장 펌프장 수중오수펌프 구입	수중오수펌프 7.5㎾, 2대 3.7㎾, 2대 2.2㎾, 2대	47	한국펌프공업협동조합	지방계약법 시행령 제25조 1항 6호 라목6
	용역	남원하수처리장 탈취설비 유지관리 용역	탈취설비 유지관리 1식	20	태일환경관리(주)	지방계약법 시행령 제25조 5호(1인견적)
	물품	남원하수처리장 이산화염소발생기 약품 및 수리부품 구입	아큐사이드100A 2,500kg, 아큐사이드100B 2,000kg	20	㈜더존 이엔티	지방계약법 시행령 제25조 5호(1인견적)
	공사	제주시 추자도 소규모 공공하수처리시설 보수공사	소규모 공공하수처리시설 보수 1식	47	대운토건(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	공사	제주시 동부위생처리장 탈수기 수리	탈수기 수리 1식	45	㈜유천엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 4호 바목
	공사	남원하수처리장 유입펌프동 노후배관 교체공사	토출배관 교체 13m 전동밸브 설치 1대	43	(주)아름공조	지방계약법 시행령 제25조 5호
현대화 추진단	공사	제주하수처리장 원심탈수기 오버홀 정비공사	원심탈수기 1대 정밀점검 및 수리	34	(주)로얄정공	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제4호 바목
	물품	제주하수처리장 생물반응조 정비공사 수중펌프 구입	수중펌프 2대 구입	37	한국펌프공업협동조합	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제6호 라목
	용역	제주공공하수처리시설 수질원격감시시스템(TMS) 유지관리용역	수질원격감시시스템(TMS) 유지관리 1식	30	제이텍	지방계약법 시행령 제26조

❍ 2023년 5천만원 이상

(단위 : 백만원)

부서명	구분	사업명		사업개요	사업비	업체명	사유
상수 도부	용역		2023년 노로바이러스 및 병원성 미생물 분포 실태조사 용역	2023년 노로바이러스 및 병원성 미생물 분포 실태조사	453	DK EcoV 환경미생물연구소	지방계약법 시행령 26조
	용역		광평지구 취수원 개발사업 지하수 영향조사 용역	지하수 영향조사 1식	53	(주)기반이엔씨	지방계약법 시행령 26조
	공사		서귀포시 상예수원지 취수량 급감에 따른 긴급 상수도 관로 연결공사	상수도시설공사 L=0.60km	144	호암건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	물품		외도수원지 노후 송수펌프(양흡입벌류트) 제작 설치 조달 구입	펌프 제작설치 1식	106	한국펌프공업협동조합	지방계약법 시행령 25조
	물품		지하수 노후 기동반 교체 및 계장제어장치 긴급 제작설치	계장제어장치 긴급 제작설치 1식	138	한국자동제어공업(협)	지방계약법 시행령 25조
	물품		강정정수장 현대화사업 막여과 공법자재 구입	막여과 공법자재 구입 1식	5,981	효성화학(주)	지방계약법 시행령 25조
	물품		소형생물 대응체계 구축 정밀여과장치 구입	정밀여과장치 구입 1식	135	㈜보선 워터텍	지방계약법 시행령 25조
	공사		조천소블록(소공원) 상수관망 긴급개선공사	배수관로 D80 L=1.373㎞	84	호암건설(주)	지방계약법 시행령 제25조
	용역		제주특별자치도 중점관리대상지역 채수 용역	중점관리 지역 채수용역 1식	115	(주)상아엔지니어링	지방계약법 시행령 제26조
	용역		효율적인 유수율 향상방안 연구용역	유수율 향상방안 연구용역 1식	250	(사)대한상하수도학회	지방계약법 시행령 제26조 제2항 지방계약법 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시
	물품		스마트 관망관리 원격자동검침시스템(단말기 설치) 구축사업	원격검침 단말기 설치 9,770개	281	청호정밀 (청호솔루션)	지방계약법 시행령 제25조
하수 도부	물품		남원공공하수처리시설 증설사업 관급자재(탈취기)	탈취기 310㎥/min 구입 설치	504	대승 엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 1항 6호 라목의 1
	용역		남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계,3공구) CCTV조사용역 및 수밀시험용역	CCTV조사 1.6km	54	㈜성광산업	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	공사		동부하수처리구역(평대리) 노후 차집관로 긴급 복구공사	차집관로 교체 (주철관D250mm, L=15m) 1식	69	주식회사 지운	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제2호
	용역		23년 동부·서부하수처리장 수질원격감시시스템(TMS) 유지관리용역	TMS 유지관리 용역	61	제이텍	지방계약법 시행령 제26조 3항
	용역		23년 서귀포하수운영과 수질원격감시시스템(TMS)유지관리 용역	TMS 유지관리용역 1식	128	제이텍	지방계약법 시행령 제26조 3항
	용역		24년 서귀포하수운영과 수질원격감시시스템(TMS)유지관리 용역	TMS 유지관리용역 1식	123	제이텍	지방계약법 시행령 제26조 3항
	공사		성산2중계펌프장 차집관로 긴급복구공사	긴급복구공사 1식	172	하지산업(주)	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제1호
현대화 추진단	물품		2023년 제주특별자치도 상하수도본부 건설기계 25톤 덤프트럭 구입	덤프트럭 25톤 1대 구입	209	주식회사 대우트럭제주영업소	지방계약법 시행령 제26조 제1항

□ 2024년

❍ 2024년 1천만원 이상 2천만원 미만

(단위 : 백만원)

부서명	구분	사업명	사업개요	사업비	업체명	사유
경영관리과	용역	2023회계연도 하수도사업특별회계 회계자문 및 결산지원 용역	하수도공기업특별회계 결산 1식	16	김길복공인 회계사사무소	지방계약법 시행령 제25조 제5호(1인견적)
	용역	제주특별자치도 하수도 중장기경영관리계획 (2024~2028) 수립용역	하수도 중장기 경영관리 계획 수립 1식	18	한국수도경영연구소	지방계약법 시행령 제25조 제5호(1인견적)
	용역	2024사업연도 수도사업특별회계 회계감사인 선임 및 회계감사 용역	회계감사 1식	18	김길복공인회계사사무소	지방계약법 시행령 제25조 제5호(1인견적)
	용역	상하수도요금 ARS간편납부시스템 유지관리 용역	시스템 유지관리 1식	19	주식회사 케이알시스	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
	용역	2024년 사업년도 하수도사업 공기업특별회계 회계감사인 선임 및 회계감사	회계감사 1식	19	공인회계사장재호사무소	지방계약법시행령제25조제1항제5호(수의1인견적)
상수 도부	용역	광평지구 취수원 개발사업 (추수공)지하수영향조사용역	지하수 영향조사 1식	10	㈜기반 이엔씨	지방계약법 시행령 25조
	용역	고다시지구 배수지 정비공사 폐기물처리용역	폐기물처리 1식	10	정우산업 개발(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	원인자부담금 (법환동 1546번지) 상수도 시설사업 실시설계용역	실시설계용역 1식	19	㈜범영 엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	용역	2024년 상수도시설 확충(교래, 광평) 전기공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	11	㈜윤 엔지니어링	지방계약법 시행령 25조
	물품	2024년 수질분석용 가스 구입	초고순도 헬륨 등 8종	13	새한가스 공업	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	공사	선흘광역 2호공 및 삼양광역 1호공 지하수 긴급 인양정비공사	인양정비공사 1식	14	㈜도현	지방계약법 시행령 제25조
	공사	아라지구 1호공 외 2개소 지하수 수위 측정관 정비공사	측정관 정비공사 1식	19	(주)지엠씨	지방계약법 시행령 제25조
	공사	토평광역 3호공 지하수 긴급 인양 정비공사	인양정비공사 1식	16	(주)용천	지방계약법 시행령 제25조
상수 도부	공사	구좌지구 1호공 지하수 외 1개소 긴급 인양정비공사	인양정비공사 1식	18	하지산업(주)	지방계약법 시행령 제25조
	공사	상천지구 2호공 지하수 긴급 인양 정비공사	인양정비공사 1식	15	(주)한가람	지방계약법 시행령 제25조
	공사	교래지구 1호공 지하수 긴급 인양정비공사	인양정비공사 1식	14	(주)규성	지방계약법 시행령 제25조
	공사	서광광역 4호공 지하수 긴급 인양정비공사	인양정비공사 1식	18	(주)남천개발	지방계약법 시행령 제25조
	공사	신흥2광역 2호공과 오라지구 1호공 지하수 긴급 인양정비공사	인양정비공사 1식	12	재능엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조
	공사	강정정수장 정밀여과장치 필터 교체 공사	필터교체공사 1식	20	(주)오라	지방계약법 시행령 제25조
	공사	영어교육도시 4호공 지하수 긴급 인양 정비공사	인양정비공사 1식	16	(주)진산	지방계약법 시행령 제25조
	공사	애월지구 2호공 지하수 긴급 인양 정비공사	인양정비공사 1식	18	(주)도현	지방계약법 시행령 제25조
	공사	어승생정수장 완속여과2, 3지 긴급 삭취공사	긴급 삭취공사 1식	16	우남건설(주)	지방계약법 시행령 제30조
	공사	조천정수장 밸브 제어함 설치 전기공사	제어함 설치 전기공사 1식	15	(주)대은계전	지방계약법 시행령 제25조
	공사	회천광역 2호공과 유수암 광역 4호공 지하수 긴급 인양정비공사	인양정비공사 1식	20	(주)한가람	지방계약법 시행령 제25조
	공사	조천정수장 전동밸브 및 체크밸브 교체공사	전동밸브 및 체크밸브 교체공사 1식	13	(주)장우	지방계약법 시행령 제30조
	공사	오라 3호공과 고성(D-212)지하수 긴급 인양 정비공사	인양정비공사 1식	17	하지산업(주)	지방계약법 시행령 제25조
	공사	조천지구 2호공과 의귀1광역 3호공 지하수 긴급 인양 정비공사	인양정비공사 1식	18	(주)규성	지방계약법 시행령 제25조
	공사	상가광역 4호공 지하수 긴급 인양 정비공사	인양정비공사 1식	17	(주)남천개발	지방계약법 시행령 제25조
	공사	염통지구 2호공 지하수 긴급 인양정비공사	인양정비공사 1식	16	재능엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조
상수 도부	용역	2024년 상수도부 소방안전관리 업무대행용역	업무대행용역 1식	16	조은 이앤씨(주)	지방계약법 시행령 제25조
	용역	2024년 민오름배수지 외 10개소 무인경비용역	무인경비용역 1식	18	(주)에스원	지방계약법 시행령 제25조
	용역	추자정수장 등 막여과시설 유지관리 및 기술진단 용역	유지관리 및 기술진단 용역 1식	20	㈜청아 이엔지	지방계약법 시행령 제30조
	용역	추자정수장 해수담수화시설 개량,증설사업에 따른 우수유출 저감대책 용역	우수유출 저감대책 용역 1식	11	(주)제이피엠	지방계약법 시행령 제30조
	용역	삼양3수원지 고도정수처리시설 여과막(RO) 복합세정(CIP) 용역	여과막(RO) 복합세정(CIP) 용역 1식	13	고도환경텍	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조
	용역	상수도 지하수 소독약품(정제소금) 운반 용역	소독약품(정제소금) 운반 용역 1식	13	(주)칠성화학환경개발	지방계약법 시행령 제25조
	용역	취.정수장 노후 전기시설 개량공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	20	㈜윤엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조
	용역	2024년 상수도부 안전관리업무대행 용역	업무대행용역 1식	11	(사)안전보건진흥원	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조
	용역	한림정수장 고도정수처리시설 NF멤브레인 약품세정 용역	약품세정 용역 1식	20	효림 이엔아이(주)	지방계약법 시행령 제30조
	용역	농어촌생활용수 및 급수취약지역 상수도 시설공사 건설재해예방 기술지도 용역	기술지도 용역 1식	11	㈜에이원 세이프티	지방계약법 시행령 제25조
	물품	함덕광역수원 외 3개소 UPS축전지 구입	UPS축전지 구입 1식	11	세방전지총판(주)	지방계약법 시행령 제25조
	용역	2024년 상수도 원격검침 통합관리시스템 유지보수 용역	통합관리시스템 유지보수 용역 1식	15	(주)그렉터	지방계약법 시행령 25조
	용역	2024년 상수관망 블록화시스템 유량 현장전송반 유지보수관리 용역	유지보수관리 용역 1식	19	㈜테크원 시스템	지방계약법 시행령 25조
	용역	2024년 자동드레인 장치 유지관리 용역	유지보수관리 용역 1식	18	블루센(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	남원읍 남원리 누수관 교체공사 폐기물처리용역	폐기물 처리 용역 1식	14	성진산업(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	비자림로 확포장공사구간 노후상수도관 교체 병행시공 GIS DB 구축 용역	GIS DB 구축 용역 1식	18	(주)에이오디	지방계약법 시행령 25조
하수 도부	용역	2024년 분뇨 수집운반 및 처리 수수료 원가산정 용역	분뇨 수집운반 및 처리 수수료 원가산정	18	재단법인 한국자치경제연구원	지방계약법 시행령 제25조제5호(1인견적)
	용역	남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구) 폐기물처리용역	폐기물 처리 1식	19	이도에코 표선(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	의귀리 침수구역 하수관로 개선공사	월류관 설치 L=10m	13	승우건설㈜	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사 (월류수처리시설) 폐기물처리 용역	폐기물처리 1식	17	서귀포산업	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	대정공공하수처리시설 증설사업 문화재 시굴 조사용역	실시설계 1식	19	재단법인 제주고고학연구소	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	공사	대동천1 맨홀펌프장 계측제어장치 이설공사	계측제어장치 이설 1식	14	㈜대산	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 나목
	용역	제주하수처리구역(우선시행분) 차집관로 GIS DB 구축용역	GIS DB 구축 1식	15	㈜가온도시정보	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	용역	제주하수처리구역(도남·건입) 차집관로 정비공사 폐기물 처리용역	차집관로 정비 폐기물 처리 및 운반 1식	19	주식회사 청봉환경	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	용역	제주시 소규모 하수관로 정비공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	19	㈜한일엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목
	용역	제주특별자치도 소규모 하수관로 정비공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	19	㈜길토목설계사무소	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목
	용역	동부(월정)공공하수처리시설 증설사업 소방공사 감리용역	소방감리 1식	19	㈜윤엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	용역	제주하수처리구역 병문중계펌프장 전기안전관리대행 용역	병문중계펌프장 전기안전관리대행 1식	14	주식회사 대성전기안전관리	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	제주하수처리구역 도두중계펌프장외 3개소 전기안전관리대행 용역	도두, 첨단, 외도, 용담중계펌프장 전기안전관리대행 1식	18	한라전기안전관리(주)	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	제주하수처리구역 화북중계펌프장외 1개소 전기안전관리대행 용역	화북, 삼양2중계펌프장 전기안전관리대행 용역 1식	19	㈜대한전기안전관리	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	2024년도 제주시 월류수 처리시설 유지관리(점검) 대행 용역	월류수 처리시설 유지관리(점검) 1식	19	㈜피앤아이휴먼코리아	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
하수 도부	물품	제주하수처리구역 중계 및 간이펌프장 펌프제어용 PLC 및 오뚜기볼 구입	PLC CPU모듈 외 8개 품목 구입	19	에이티씨테크	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	물품	제주하수처리구역 중계 및 간이펌프장 수위조절용 레이더수위계 구입	레이다수위계(10m) 2세트, 레이다수위계(18m) 2세트	19	주식회사 아진	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주시 동지역 하수펌프장 수중펌프 수리	수중스크류펌프(200A*22kW), 수중스크류펌프(100A*11kW) 각 1대 수리	13	삼진펌프산업	지방계약법 시행령 제25조제1항제4호바목
	용역	화북, 삼양지역 하수펌프장 불명수(해수) 유입 맨홀 및 관로 보강 CCTV조사 용역	오수펌프장 5개소 CCTV조사 L=1,800m	19	제이앤제이특수개발 주식회사	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주하수처리구역 외도중계펌프장 시설개선 벽화조성공사	펌프장 외벽 벽화조성 40㎡	13	아트톡	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	공사	제주하수처리장 삼양2중계펌프장 수중오수(스크류)펌프 수리	수중 스크류펌프(250A*75kW*380V) 1대	13	삼진공업(주)	지방계약법 시행령 제25조제1항제4호바목
	공사	제주시 동지역 하수시설물 정비공사	월평어린이집북측 펌프장 맨홀, 노후배관, 자동탈착장치 등 교체	19	주식회사 용천	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호
	용역	2024년 동부하수처리장 시설물 정밀(정기)안전점검 용역	시설물 정밀안전점검 1식 시설물 정기안전점검 1식	17	사단법인 대한산업안전협회	지방게약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목
	용역	2024년 동부, 서부하수처리장 반응조 수질계측기기 유지관리 용역	반응조 수질계측기기 정기점검	19	제이텍	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목
	공사	동부하수처리장 행원중계펌프장 토출배관 및 가이드 파이프 교체 공사	토출배관 및 가이드 파이프 각 3개소	20	주식회사 지운	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목
	공사	동부하수처리장 노후 태양광설비 교체 공사	태양광 인버터 교체 1식	19	주식회사 이투지	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 가목
	공사	동부하수처리장 맨홀펌프장 초음파 및 레이다 수위게 설치공사	초음파 및 레이더 수위계 설치 1식	14	유성제어기술 주식회사	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 가목
	물품	동부하수처리장 펌프장용 PLC 예비자재 구입	PLC 예비자재 구입 1식	19	두신기술	지방게약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목
	용역	2024년 서부하수처리장 시설물 정기 안전검검 용역	시설물 정기안전점검 (상·하반기) 1식	10	주식회사 태신엔지니어링건축사사무소	지방계약법 시행령 25조 제1항 5호
하수 도부	용역	서부하수처리장 사설항로표지(등부표) 유지관리 용역	사설항로표지 유지관리 용역 1식	10	주식회사 마린테크	지방계약법 시행령 제25조제1항5호 및 같은법 시행령제30조제1항
	물품	서부하수처리장 2단계 반응조 교반기(7.5KW) 수리	2단계 반응조 교반기 2대 수리	13	기산수기	지방계약법 시행령 제25조
	물품	서부하수처리구역 한수·애월펌프장 수중펌프 수리	수중펌프(37kW 1대, 55kW 1대) 수리 1식	14	(주)현대수중펌프	지방계약법 시행령 25조 5호
	물품	서부 하수처리구역 중계(옹포·금성)펌프장 수중펌프 수리	수중펌프 2대 수리	14	주식회사 대진정공	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조
	용역	2024년 서부하수처리장 중계(애월,곽지) 펌프장 탈취설비 유지관리 용역	탈취설비 유지관리 1식	15	태일환경관리 주식회사	지방계약법 시행령 제25조 제1항제5호나목
	용역	2024년 서부하수처리장 전기안전관리 대행 용역	전기안전관리 대행 용역 1식	17	두인 일렉트릭	-지방계약법 시행령 제25조 -지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5장
	물품	서부 하수처리구역 가문·한림펌프장 수중펌프 수리	수중펌프(75kW 1대, 45kW 1대) 수리 1식	17	(주)현대수중펌프	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조
	물품	서부하수처리장 반응조 DO 계측기 구입	DO 계측기 2대	18	제이텍	지방계약법 시행령 제25조
	공사	서부하수처리장 원심탈수기 정밀 정비공사	원심탈수기 1대	19	㈜이화에코시스템	지방계약법 시행령 제25조
	물품	서부하수처리장 UV소독설비 소모품 구입	UV소독설비 소모품 1식	16	도림이엔지 (주)	지방계약법 시행령 제25조
	용역	보목하수처리장 사설항로표지 등부표 유지관리용역	등부표 2기 유지보수용역 1식	12	마린테크	지방계약법 시행령 제25조 제1항제5호
	공사	대정하수처리장 반응조 5지 분배조 유출밸브 교체 공사	반응조 5지 분배조 유출밸브 교체 1식	19	㈜푸른이엔지	지방계약법 시행령 제25조 제1항제5호
	공사	대정하수처리장 원심탈수기 A호기 수선 공사	탈수기 수리 1식	18	㈜플루엔	지방계약법 시행령 제25조 제1항제5호
	공사	대정하수처리장 침사지 미세목스크린 수리 공사	침사지 미세목스크린 수리 1식	16	㈜대승엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 제1항제5호
	물품	남원하수처리장 PLC 통신카드 구매	PLC 통신카드 구입 1식	14	에이티씨테크	지방계약법 시행령 제25조 5호
	용역	2024년 남원하수처리장 탈취설비 유지관리 용역	탈취설비 유지관리 1식	19	태일환경 관리(주)	지방계약법 시행령 제25조 5호
하수 도부	용역	2024년 남원하수처리장 시설물 정기 안전점검 용역	시설물 유지보수	10	㈜태신엔지니어링건축사사무소	지방계약법 시행령 제25조 5호
	공사	남원하수처리장 남원3-1 간이펌프장 외 4개소 수위계 교체공사	수위계 교체공사 1식	19	㈜코리아파워	지방계약법 시행령 제25조 5호
	공사	2024년 성산하수처리장 및 중계펌프장 준설공사	준설공사 1식	15	주식회사 주현건설	지방계약법 시행령 제25조 5호
현대화 추진단	물품	제주하수처리장 자외선소 독설비 자외선램프 및 부속품구입	자외선소독설비 램프 및 부속품 구입 1식	17	다인메카테크	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	용역	2024년 제주하수처리장 탈취설비 유지관리 용역	탈취설비 유지관리 1식	18	태일환경관리주식회사	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	공사	제주하수처리장 생물반응조 교반기 및 내부반송펌프 교체 수리	생물반응조 설비 정비 1식	18	주식회사용천	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	물품	2024년도 제주하수처리장 미생물 탈취기용 약품(미생물및영양제) 구입	미생물탈취기 미생물 및 영양제 구입 1식	19	주식회사 한수엔지니어링	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	용역	2024년 제주하수처리장 에너지진단 용역	에너지이용합리화법에 따른 에너지진단 1식	17	에너지절감사업㈜	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호
	용역	2024년도 제주하수처리장 전기설비 안전관리업무 대행 용역	전기설비 안전관리 대행 1식	17	(주)썬텍제주	지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호

❍ 2024년 2천만원 이상 5천만원 미만

(단위 : 백만원)

부서명	구분	사업명	사업개요	사업비	업체명	사유
경영관리과	용역	상하수도 요금관리 프로그램 유지관리 용역	상하수도 요금관리 프로그램 유지관리 용역1식	46	㈜한일아이앤씨	지방계약법시행령 제25조제1항제4호
	용역	수도사업특별회계 통합회계관리 프로그램 유지관리 용역	수도사업특별회계 통합회계관리 프로그램 유지관리 용역 1식	31	㈜대양컴퓨터정보	지방계약법시행령 제25조제1항제4호
상수 도부	용역	동부지역 상수도 시설사업 실시설계용역	상수도 시설 실시설계 1식	49	㈜인트랜	지방계약법 시행령 25조
	용역	하효지구 상수관로 정비공사 폐기물처리용역	폐기물처리 1식	29	한라환경산업(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	서홍지구 상수관로 정비공사 폐기물처리용역	폐기물처리 1식	35	한라환경 산업(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	민군복합형 관광미항 진입도로 상수도시설 개선공사	감압밸브설치 2개소, 유량계설치 1개소	45	㈜으뜸 이엔지	지방계약법 시행령 25조
	공사	고다시지구 배수지 정비공사	정비공사 1식	45	운암건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	동부지역 상수도 시설사업 실시설계용역	실시설계용역 1식	49	(주)인트랜	지방계약법 시행령 25조
	공사	고다시지구 배수지 정비공사	배수지 부대시설 정비 1식	45	운암건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	물품	먹는물 미생물시험 소모품 구입	미생물시험 배지 등 5종	26	케이랩	지방계약법 시행령 25조
	공사	월산정수장 외 3개소 국기게양대 설치 및 보강공사	국기게양대 신규설치 3개소, 스텐봉 설치 1개소	27	㈜성혁하우징	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	공사	마라도, 가파도 2호공 지하수 양수시험 공사	마라도지하수, 가파도2호공 최대양수량 양수시험 1식	34	㈜연웅이앤씨	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	공사	2024년 상수도용 지하수 관정 정비공사	지하수 정비공사 1식	49	㈜웅지산업개발	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	공사	취,정수장 건축물 방수 및 도장공사	건축물 방수 및 도장공사 1식	48	㈜혜원건설	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	공사	오라정수장 급속여과기 도장공사	급속여과기 도장 1식	45	초록건설(주)	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	공사	유수암정수장 계통 전기설비 보수공사	전기설비 보수 1식	48	용산전력(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	취,정수장 노후 수배전반 교체 전기공사	취,정수장 노후 수배전반 교체 전기공사 1식	45	㈜수정시업	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	공사	취,정수장 태양광발전설비 정비공사	취, 정수장 태양광발전설비 정비 1식	49	㈜금경전력	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	용역	강정정수장 현대화사업 착공식 행사 대행 용역	착공식 행사대행 1식	30	제주늘푸른	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	용역	2024년 취,정수장 염소투입기 유지관리 용역	유지괸리 용역 1식	45	㈜제이텍워터	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	용역	2024년 상수도부 소관 정수장(15개소)방역소독용역	방역소독 용역 1식	49	벨킨스	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	용역	외도,산지천 생태하천복원사업 모니터링용역(3차)	모니터링 용역 1식	47	㈜영아리환경기술	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	용역	2024년 상수도시설물 보수,보강공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	39	㈜청풍엔지니어링	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	용역	취,정수장 노후 수배전반 교체 전기공사 감리용역	감리용역 1식	48	㈜마루 이엔지	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	용역	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 착공식 행사 대행 용역	착공식 대행 용역 1식	24	제주늘푸른	지방계약법 시행령 25조 및 30조
	공사	애월읍 노후상수관망(장전지구) 유량계 정비공사	유량계 정비공사 1식	48	마성토건(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	애월읍 노후상수관망(신엄지구) 유량계 정비공사	유량계 정비공사 1식	48	운암건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	조천대블록 급수취약지구 개선공사	배수관(D50mm) 정비 L=128m	48	(주)아람건설	지방계약법 시행령 25조
	공사	와흘리 노후 배수관로 이설공사	배수관(D80mm) 정비 L=105m	38	(주)청송건설	지방계약법 시행령 25조
	공사	2024년 제주시 동지역(동부) 누수처 복구공사	누수처 복구공사 45건	49	호림건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	2024년 남원·표선 긴급 누수복구공사	누수처 복구 50개소	48	세진건설(주)	지방계약법 시행령 25조
상수 도부	공사	2024년 제주시 동지역(동부) 누수처 복구공사(2차)	누수처 복구공사 45건	49	(주)성일건설	지방계약법 시행령 25조
	공사	어승생(정) 서부간선 송수관로 분기 개선공사	스트레이너 설치 3개소	49	윤우건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	공사	2024년 제주시 동지역(동부) 누수처 복구공사(3차)	누수처 복구공사 45건	49	(주)성일건설	지방계약법 시행령 25조
	공사	영평배수지 배수간선관로 개선공사	배수관로 연결 D300 L=10m 부단수 공법 2개소	35	운암건설(주)	지방계약법 시행령 25조
	용역	2024 상수도원격검침 통합시스템 G-클라우드 서비스 임차 용역 조달	클라우드 조달 임차 1식	40	(주)그렉터	지방계약법 시행령 25조
	용역	2024년 우도면 누수탐사용역	누수 탐사 용역 1식 단계시험(1블록), 누수탐사(15건	39	㈜에이치 앤텍	지방계약법 시행령 26조
하수 도부	물품	성산3 하수관로 정비공사(1공구) 2024년 시행분 수중펌프	수중펌프 4대	22	한국펌프공업협동조합	지방계약법 제25조 1항 6호 라목
	용역	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구) CCTV 조사 및 수밀시험용역	CCTV조사 1식	35	㈜효경건설	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 다목
	공사	대정하수처리장 주민편의시설(테니스장) 복구공사	아스콘포장 등 A=150㎡	34	(주)아지건설	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	용역	대평 간이오수처리시설 철거공사 폐기물 처리용역	폐기물처리 444ton	23	성진산업(주)	지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목
	용역	오라아라(1공구) 하수관로 정비사업 관로내부조사용역	CCTV조사 1식	34	선명건설㈜	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호가목
	용역	제주하수처리구역(우선시행분) 차집관로 정비공사 관로내부조사 용역	관로 내부조사 1식	28	㈜마성토건	지방계약법 시행령 제25조 및 30조
	공사	화북중계펌프장 고압전동기 전원공급케이블 배선 변경공사	고압전동기 전력케이블 배선 변경 전기공사 1식	33	㈜산남전력	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호가목
	공사	병문중계펌프장 수중사류펌프 E호기 수리	수중펌프(400A×270kW×6600V×1대) 수리	27	삼진공업(주)	지방계약법 시행령 제25조제1항제4호바목
	공사	도두중계펌프장 협작물 제거용 유입스크린 보수공사	유입스크린 레이크 및 브러시 교체 등 보수 1식	48	주식회사 재도	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호가목
하수 도부	공사	동부하수처리장 중계펌프장 4개소 수중오수펌프 수리공사	수중오수펌프 4대 수리	28	주식회사 한영이엔지	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 가목
	공사	동부하수처리장 반응조 (3지) 산기관 멤브레인 교체 공사	산기관 멤브레인 교체 1식	41	정호건설(주)	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 가목
	공사	대정하수처리장 영어교육도시 맨홀펌프장 제어반 교체공사	영어교육도시 맨홀펌프장 제어반 교체 1식	42	㈜테크원	지방계약법 시행령 제25조 제1항 마목
	공사	대정하수처리장 중계펌프장 준설공사	대정하수처리장 중계펌프장 준설 1식	46	해명환경건설㈜	지방계약법 시행령 제25조 제1항 마목
	공사	대정하수처리장 안덕4 중계펌프장 노후배관 교체공사	중계펌프장 배관교체 1식	42	대흥공영㈜	지방계약법 시행령 제30조제1항 제2호 가목
	용역	2024년도 남원하수처리장 자가용전기설비 안전관리대행 용역	시설물 유지보수 1식	22	㈜대경 엔지니어링	지방계약법 시행령 제25조 5호
	물품	성산하수처리장 펌프장 오수펌프 구입	수중오수펌프 30㎾ 1대, 5.5㎾ 2대, 7.5㎾ 2대	34	한국펌프공업협동조합	지방계약법 시행령 제25조 1항 6호 라목6
현대화 추진단	용역	2024년 제주공공하수처리시설 수질원격감시시스템(TMS)유지관리 용역	수질원격감시시스템 유지관리 1식	32	제이텍	지방계약법 시행령 제26조

❍ 2024년 5천만원 이상

(단위 : 백만원)

부서명	구분	사업명	사업개요	사업비	업체명	사유
상수 도부		2024년 노로바이러스 및 병원성미생물 분포실태조사용역	20234 노로바이러스 및 병원성 미생물 분포 실태조사	454	DK EcoV 환경미생물연구소	지방계약법 시행령 26조
	물품	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 막여과 공법자재 구입	막여과 공법 자재 구입 1식	5,092	㈜청아 이엔지	지방계약법 시행령 25조 제1항 제4호 마목 및 사목
하수 도부	용역	제주시 동서부,서귀포지역내 하수슬러지 운반 및 처리용역	슬러지 운반 및 처리 1식	1,836	대림종합개발(주)	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제1호
	물품	제주시 동지역 하수펌프장 수중펌프 구입	수중펌프 10대 구입	66	한국펌프공업 협동조합	지방계약법 시행령 제25조제1항제6호라목6
	용역	동부, 서부하수처리장 수질원격감시시스템 유지관리용역	동·서부하수처리장 수질원격감시시스템 유지관리 1식	60	제이텍	지방계약법 시행령 제26조제2항
	공사	서부하수처리구역 곽지-금성 중계펌프장 간 차집관로 긴급 복구공사	차집관로 긴급 복구 L=108m(D600mm) 공사기간 : '24.3.19~4.2	293	주식회사 지운	지방계약법 시행령 제25조
	용역	24년 서귀포하수운영과 수질원격감시시스템(TMS)유지관리 용역	TMS 유지관리용역 1식	123	제이텍	지방계약법 시행령 제26조 3항
현대화 추진단	용역	제주공공하수처리시설 수질관리 및 수처리공정 컨설팅용역	수처리공정 컨설팅 1식	672	이엔워터	지방계약법 시행령 제26조

26. 각종 공사 특허품 및 특허공법(신기술포함) 사용현황

□ 2023년

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	특허공법, 공사자재 신기술	사업비	업체명	비고
상수도부	애월정수장 고도정수처리시설사업	고도정수처리시설공법 기자재	5,087	금호건설(주)	특허 제10-0786776호 등
	강정정수장 현대화사업	막여과 공법자재 (MF, Q=25,000㎥/일)	5,950	㈜효성화학	특허 제10-1443491호, 특허 제10-1494053호, 특허 제10-1519727호, 특허 제10-1523471호
	조천정수장 고도정수처리시설사업	막여과 공법자재 (MF+RO, Q=37,000㎥/일), 농축수처리공법(BBF)	13,200	금호건설㈜	특허 제10-0786776호, 특허 제10-0938344호, 특허 제10-0954571호, 특허 제10-1352497호, 특허 제10-1931429호, 특허 제10-1710155호
	토평정수장 고도정수처리시설사업	막여과 공법자재 (MF, Q=12,400㎥/일)	3,957	㈜효성화학	특허 제10-1443491호, 특허 제10-1494053호, 특허 제10-1519727호, 특허 제10-1523471호
하수도부	서부(판포) 하수처리장 증설사업	하수처리공법 기자재 (협잡물처리기)	1,263	대승 엔지니어링	제10-1167841호 제10-1648580호 제10-2431051호
	동부(월정) 하수처리장 증설사업	하수처리공법 기자재 (탈취기)	225	㈜한주나노	성능인증 21-FAZ0241
			164	사단법인 대한민국공무원 공상유공자회	물품분류번호 401660501

□ 2024년

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	특허공법, 공사자재 신기술	사업비	업체명	비고
상수도부	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	해수담수화 막여과 공법자재 (MF+RO, Q=1,500㎥/일)	5,280	㈜청아이엔지	특허 제10-1523471호, 특허 제10-2544210호
하수도부	서귀포시 동지역 차집관로 정비공사 (월류수처리시설)	우수토실정화장치 (ARCS-27M)	380	블루그린링크(주)	특허제 10 - 1484030호
	서부(판포) 하수처리장 증설사업	하수처리공법 기자재 (반출컨베이어)	1,371	가온텍	제10-1532074호 2410172201 NEP-2018-008
		하수처리공법 기자재 (UV소독설비)	291	에코원 테크롤리지	제10-1984755호 GT-22-01559
		하수처리공법 기자재 (탈수기)	871	이화 에코시스템	제10-2287744호 제10-1796454호

27. 하도급 등의 대금지급 확인 시스템 운용 현황

□ 총  괄 : 139건(2023년 : 95건, 2024년 : 44건)

□ 2023년

(단위 : 백만원)

계 약 명	업체명	계약일	계약금액	착공일	준공일	전용계좌개설여부	비고
남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(1공구)	주식회사 천마종합건설	2023-01-06	5,414	2023-01-30	2025-01-29	개설
남원하수처리장 노후차집관로 정비공사(2공구)	주식회사 건축사사무소오름그룹	2023-01-06	3,803	2023-01-30	2025-01-29	개설
서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2공구)(6차분)	영주종합건설 주식회사	2023-01-13	1,039	2023-01-16	2023-08-30	개설
서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(3공구)(6차분)	대원종합건설주식회사	2023-01-13	174	2023-01-16	2023-04-12	개설
제주시 화북 문화아파트 일원 오수관 정비공사	주식회사 호담건설	2023-01-30	61	2023-02-06	2023-05-06	개설
제주하수처리구역 차집관로 및 펌프장 비상재자 보관용 창고 신축공사	(주)보국디자인	2023-02-02	182	2023-02-02	2023-05-27	개설
제주하수처리구역 병문중계펌프장 노후 고압전동기 제어반 교체공사	주식회사 해난디	2023-02-02	114	2023-02-02	2023-05-12	개설
오라·아라(1공구) 하수관로 정비사업(3차분)	일호종합건설 주식회사	2023-02-03	3,045	2023-02-06	2024-06-27	개설
2023 하수관로 BTL사업 분구내 배수설비공사	기흥건설(주)	2023-02-15	176	2023-02-15	2023-07-22	개설
서회천도로변 오수펌프장 처리구역 차집관로 개량공사	삼록건설 (주)	2023-02-21	322	2023-02-24	2023-08-20	개설
어승생정수장(광령지선) 상수도시설 긴급공사	기흥건설(주)	2023-02-24	94	2023-02-24	2023-04-22	개설
대정하수처리장 차집관로 정비사업(1공구)(4차분)	태웅종합건설 주식회사	2023-02-27	519	2023-02-28	2023-05-28	개설
한림 비양도 소규모 하수관로 정비공사	웅지건설 주식회사	2023-02-28	225	2023-02-28	2023-08-26	개설
남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_3공구)	금나종합 건설(주)	2023-03-03	6,210	2023-03-13	2026-03-12	개설
남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계_2공구)	신화종합건설주식회사	2023-03-03	5,565	2023-03-13	2026-05-04	개설
23년 스마트 원격검침 디지털 미터기 교체공사(제주시 동지역)	조성건설(주)	2023-03-03	158	2023-03-03	2023-07-30	개설
어승생정수장(서부간선) 송수관로 긴급복구공사	늘푸른건설주식회사	2023-03-06	453	2023-03-06	2023-07-03	개설
서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사(2차분)	금성종합건설 주식회사	2023-03-14	498	2023-03-14	2024-02-23	개설
대정하수처리장 차집관로 정비사업(2공구)(2차분)	용우종합건설 주식회사	2023-03-17	765	2023-03-17	2023-11-30	개설
교래지구 취수원(2호공) 개발사업	주식회사 규성	2023-03-22	573	2023-03-22	2023-11-26	개설
교래지구 취수원(1호공) 개발사업	주식회사 규성	2023-03-22	565	2023-03-22	2023-11-26	개설
교래지구 취수원(3호공) 개발사업	유성삼정개발 주식회사	2023-03-22	556	2023-03-22	2023-11-26	개설
교래지구 취수원(4호공) 개발사업	주식회사 워터제주	2023-03-22	551	2023-03-22	2023-11-26	개설
상하수도본부 취, 정수장 출입문(자바라) 교체 설치공사	주식회사승하	2023-03-24	56	2023-03-24	2023-05-22	개설
아라가압장 배수지 유출유량계 설치공사	두원개발 주식회사	2023-03-28	119	2023-03-28	2023-06-25	개설
서부처리구역 하수관로 정비공사(2단계-하귀2리 2공구) 3차분	청도종합건설주식회사	2023-04-04	1,104	2023-04-05	2023-12-23	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(대정지구) 상수도시설공사	주식회사 국영건설	2023-04-04	155	2023-04-04	2023-09-30	개설
원인자부담금(구좌농공단지) 상수도시설공사	태정토건 주식회사	2023-04-06	499	2023-04-10	2023-10-18	개설
소규모 수도시설(남원지구) 상수도시설공사	명부건설(주)	2023-04-06	157	2023-04-06	2023-10-02	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(애월지구) 상수도시설공사	(주)웅진건설	2023-04-07	684	2023-04-07	2023-12-07	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(한림지구) 상수도시설공사	정진건설 주식회사	2023-04-07	223	2023-04-07	2023-10-03	개설
한림·한경 소규모 유량, 수압 감시시스템 구축사업	정호건설(주)	2023-04-11	391	2023-04-11	2023-10-07	개설
소규모 수도시설(우도지구) 상수도시설공사	금장건설 주식회사	2023-04-12	284	2023-04-12	2023-10-08	개설
소규모 수도시설(성산지구) 상수도시설공사	주식회사 도암엔지니어링	2023-04-14	485	2023-04-14	2023-10-10	개설
소규모 수도시설(표선지구) 상수도시설공사	대고건설 유한회사	2023-04-14	416	2023-04-18	2023-10-14	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(구좌지구) 상수도시설공사	성림건설 주식회사	2023-04-14	346	2023-04-14	2023-10-10	개설
소규모 수도시설(조천지구) 상수도시설공사	주식회사 대광건설	2023-04-17	401	2023-04-17	2023-12-17	개설
김녕사굴지구 상수관로 개선공사	주식회사 디에이치건설	2023-04-18	192	2023-04-18	2023-08-20	개설
추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 RO설비(A,B호기) 고압펌프 등 긴급 공사	주식회사 남천개발	2023-04-25	169	2023-04-25	2023-05-14	개설
목석원지하수~아라(가)배수지 상수도관망 개선공사	주식회사 지에스 건설	2023-05-03	508	2023-05-03	2023-10-29	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(한경지구) 상수도 시설공사	주식회사 신의건설	2023-05-04	575	2023-05-04	2023-12-29	개설
노후정수장(월산) 개량사업 전기공사	주식회사 선진	2023-05-08	270	2023-05-08	2024-01-09	개설
삼양1,2수원지 노후 수배전반 교체 전기공사	신화전력 주식회사	2023-05-17	169	2023-05-17	2023-11-12	개설
원인자부담금(외도이동) 상수도 시설공사	기흥건설(주)	2023-05-19	366	2023-05-19	2023-11-14	개설
원인자부담금(용담이동) 상수도 시설공사	제주개발(주)	2023-05-19	257	2023-05-19	2023-11-14	개설
와산지구 상수도 시설공사	제일건설 주식회사	2023-05-23	860	2023-06-07	2024-04-16	개설
강정정수장 외 7개소 울타리 정비공사	동양기업	2023-05-23	62	2023-05-23	2023-09-01	개설
하례지구 대체취수원 개발사업	주식회사 디케이엘	2023-05-24	346	2023-05-24	2023-11-19	개설
남원지구 대체취수원 개발사업	㈜기반 이엔씨	2023-05-24	213	2023-05-24	2023-11-19	개설
대정·안덕 소규모 유량, 수압 감시시스템 구축사업	진명건설 주식회사	2023-05-26	235	2023-05-26	2023-12-11	개설
용흥가압장 울타리 정비공사	주식회사 케이앤	2023-05-30	87	2023-05-30	2023-07-28	개설
서귀포시 안덕면 사계리 배수설비 정비사업	광명종합건설 주식회사	2023-05-31	328	2023-05-31	2023-08-30	개설
교래지구 도수관로 시설공사	풍기건설 주식회사	2023-06-14	561	2023-06-14	2024-01-11	개설
2023년 취,정수장 수목정비공사	주식회사 에스지아큐먼	2023-06-14	70	2023-06-14	2023-07-28	개설
2022년 정밀안전점검결과 시설물 보수공사	정성토건 주식회사	2023-06-16	157	2023-06-16	2023-12-13	개설
2023년 조천대블록 2공구 누수처 복구공사	주식회사 아람건설	2023-06-20	206	2023-06-20	2023-11-26	개설
동홍지구 배수지 확충공사	주식회사 이수종합건설	2023-06-21	1,798	2023-06-21	2024-02-27	개설
서귀포시 동지역 차집관로 정비사업(1공구)	세호종합 건설(주)	2023-06-22	4,104	2023-06-22	2026-06-21	개설
원인자부담금(화북상업지구) 상수도 시설공사	황금건설 주식회사	2023-06-22	1,740	2023-06-29	2025-01-26	개설
2023년 남원대블록 누수처 복구공사	세풍건설 주식회사	2023-06-22	217	2023-06-22	2023-12-30	개설
서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계-2공구)	덕성종합건설 주식회사	2023-06-23	3,243	2023-06-30	2026-06-29	개설
2023년 조천대블록 1공구 누수처 복구공사	대명토건 주식회사	2023-06-23	195	2023-06-23	2023-11-29	개설
2023년 애월대블록 누수처 복구공사	주식회사 신용건설	2023-06-23	193	2023-06-23	2023-11-29	개설
함덕광역수원 노후 수배전반 교체 전기공사	삼부하이텍주식회사	2023-06-23	70	2023-06-23	2023-12-19	개설
삼양광역수원 노후 수배전반 교체 전기공사	주식회사 다우이앤씨	2023-06-23	61	2023-06-23	2023-12-19	개설
남원하수처리장 노후차집관로 정비사업 전기 및 계측제어공사(1공구)	주식회사 대은	2023-06-26	506	2023-06-26	2025-06-25	개설
2023년 표선대블록 누수처 복구공사	주식회사 하이플	2023-06-27	201	2023-06-27	2023-12-03	개설
서부처리구역(저지·청수~판포간) 차집관로 정비사업	우보종합건설주식회사	2023-06-30	3,425	2023-06-30	2026-10-04	개설
추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 RO설비(C,D호기) 긴급 개량공사	삼다이엔지주식회사	2023-07-03	494	2023-07-03	2023-10-27	개설
한경면 조수(소) 판포계통 상수관망 개선사업	(주)고현종합건설	2023-07-07	1,052	2023-07-07	2024-10-18	개설
송당배수지~송당사거리구간 노후관로 교체공사	㈜나라 건설기계	2023-07-11	804	2023-07-11	2024-02-11	개설
동홍지구 배수지 확충공사 전기공사	대성전기	2023-07-20	260	2023-07-20	2024-11-15	개설
교래지구 도수관로 시설공사 전기공사	대호전기소방	2023-07-27	352	2023-07-27	2024-02-17	개설
송당리 마을안길 노후상수관로 교체공사	대아건설(주)	2023-07-28	894	2023-07-28	2024-04-23	개설
노후정수장(월산) 개량사업 정밀여과장치 설치공사	대아토건 주식회사	2023-07-28	245	2023-07-28	2023-11-24	개설
서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계-1공구) 전기공사	주식회사 신원전기	2023-07-28	166	2023-07-28	2025-07-27	개설
2023년 구좌대블록 누수처 복구공사	興國建設 株式會社	2023-08-14	145	2023-08-14	2024-01-20	개설
2023년 성산대블록 누수처 복구공사	혜명환경건설 주식회사	2023-08-14	131	2023-08-14	2024-01-20	개설
2023년 조천읍 대블록 누수처 복구공사	홍남건설 주식회사	2023-09-12	187	2023-09-12	2023-12-25	개설
2023년 애월읍 일원 상수도시설 정비공사	다인건설 주식회사	2023-09-26	77	2023-09-26	2023-12-24	개설
서귀포 서홍동홍 하수관로 정비사업(2단계)전기 및 계측제어 공사	삼성전설 주식회사	2023-10-19	88	2023-10-19	2024-11-08	개설
서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 1공구 전기 및 계측제어 공사	성원전기공사	2023-10-20	343	2023-10-27	2025-04-26	개설
서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 2공구 전기 및 계측제어 공사	주식회사남도	2023-10-20	185	2023-10-27	2024-10-26	개설
제주하수처리구역(도남·건입동) 차집관로 정비공사	일호종합건설 주식회사	2023-10-30	2,093	2023-11-02	2025-04-24	개설
서광정수장 비상발전기 설치 전기공사	용산전력 주식회사	2023-11-01	145	2023-11-01	2024-02-28	개설
토평정수장 고도정수처리시설 사업	영성토건 주식회사	2023-11-14	8,756	2023-11-14	2025-11-12	개설
서귀포 예래대륜 하수관로 정비사업(2단계) 3공구 전기 및 계측제어 공사	(주)대우전기	2023-11-24	104	2023-12-01	2024-05-31	개설
서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(월류수처리시설)	주식회사청봉환경	2023-11-28	1,538	2023-11-30	2025-05-30	개설
오라가압장 노후 수배전반 교체 전기공사	주식회사 성훈전력	2023-11-28	91	2023-11-28	2024-02-05	개설
토평정수장 고도정수처리시설사업 전기공사	진흥기업 주식회사	2023-12-11	1,051	2023-12-11	2025-12-09	개설
조천정수장 고도정수처리시설 전기공사	영산전기(주)	2023-12-15	2,224	2023-12-15	2026-12-13	개설
오라정수장 소형생물 대응체계 구축 정밀여과장치 설치공사	주식회사 부국건설	2023-12-27	94	2023-12-27	2024-04-24	개설
토평정수장 고도정수처리시설사업 소방공사	주식회사 한성이엔지	2023-12-28	116	2023-12-28	2025-12-26	개설
남원 대체취수원 송수관로 시설공사	제복건설 주식회사	2023-12-28	88	2024-01-05	2024-04-03	개설
2023년 성산중블록 상수도시설(감압밸브) 정비공사	조성건설(주)	2023-12-28	75	2023-12-28	2024-02-25	개설

□ 2024년

(단위 : 백만원)

계 약 명	업체명	계약일	계약금액	착공일	준공일	전용계좌개설여부	비고
남원읍 남원리 누수관 교체공사	다인건설 주식회사	2024-01-08	138	2024-01-08	2024-05-06	개설
남원읍 남원리 감압밸브 설치공사	주식회 사 동현	2024-01-08	133	2024-01-08	2024-05-26	개설
남원읍 위미리 감압밸브 설치공사	기성건설(주)	2024-01-08	98	2024-01-08	2024-07-28	개설
강정정수장 현대화사업 소방공사	주식회사 광동전력	2024-01-09	274	2024-01-09	2027-01-07	개설
강정정수장 현대화사업 정보통신공사	쓰리에스텍(주)	2024-01-11	252	2024-01-11	2027-01-09	개설
강정정수장 현대화사업 전기공사	㈜성원 이앤지	2024-01-12	3,866	2024-01-12	2027-01-10	개설
2023년 표선대블록 누수처 복구공사	윤우건설 주식회사	2024-01-12	172	2024-01-12	2024-07-09	개설
2023년 남원대블록 누수처 복구공사	주식회사 웅지산업개발	2024-01-12	171	2024-01-12	2024-07-09	개설
서귀포 대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비공사(3차분)	금성종합건설 주식회사	2024-01-17	308	2024-01-17	2024-07-31	개설
2024년 성산대블록 누수처 복구공사	세희건설 주식회사	2024-02-28	197	2024-02-28	2024-12-23	개설
2024년 애월대블록 누수처 복구공사	제주동부건설 주식회사	2024-02-28	196	2024-02-28	2024-12-23	개설
동홍지구 배수지 확충공사	주식회사 이수종합건설	2024-03-04	450	2024-03-04	2024-11-23	개설
서부처리구역 하수관로 정비(2단계-2공구) 전기공사	㈜신성 정보통신	2024-03-07	165	2024-03-07	2026-02-24	개설
월정 공공하수처리시설 증설사업(2차분)	주식회사 대저건설	2024-03-26	2,396	2024-03-28	2024-12-28	개설
동부(월정) 공공하수처리 시설 증설사업 소방공사	동원설비 주식회사	2024-04-02	176	2024-04-02	2025-09-23	개설
대정하수처리장 중계펌프장 자중강하수문용 전동구동장치 교체	주식회사 세웅냉동설비	2024-04-11	217	2024-04-11	2024-08-08	개설
동홍지구 상수관로 정비공사	신창토건 주식회사	2024-06-19	804	2024-06-19	2025-02-13	개설
서홍지구 상수관로 정비공사	주식회사 대석건설	2024-06-19	495	2024-06-19	2024-12-15	개설
하효지구 상수관로 정비공사	덕운건설 주식회사	2024-06-19	276	2024-06-19	2024-10-16	개설
추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	주식회사 지원건설	2024-06-20	8,094	2024-06-27	2026-06-26	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(조천, 구좌지구) 상수도 시설공사	주식회사 도경건설	2024-06-21	468	2024-06-27	2024-12-23	개설
소규모 수도시설(표선지구) 개량공사	세운건설 주식회사	2024-06-24	302	2024-07-01	2024-10-28	개설
소규모 수도시설(성산지구) 개량공사	㈜한국관정컨설턴트	2024-06-24	250	2024-06-26	2024-10-23	개설
소규모 수도시설(안덕지구) 개량공사	주식회사 성지건설	2024-06-25	664	2024-06-25	2024-12-21	개설
광평지구 대체취수원(1호공) 개발공사	주식회사 연웅이앤씨	2024-06-25	606	2024-06-25	2025-02-19	개설
광평지구 대체취수원(2호공) 개발공사	주식회사 진산	2024-06-25	602	2024-06-25	2025-02-19	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(한림지구) 상수도 시설공사	세풍건설 주식회사	2024-06-25	580	2024-06-27	2024-12-23	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(애월지구) 상수도 시설공사	(주)아지건설	2024-06-25	462	2024-06-28	2024-12-24	개설
교래지구 대체취수원(5호공) 개발공사	용산기술(주)	2024-06-26	467	2024-06-26	2025-02-20	개설
교래지구 대체취수원(6호공) 개발공사	주식회사웅지산업개발	2024-06-26	439	2024-06-26	2025-02-20	개설
소규모 수도시설(대정지구) 개량공사	주식회사 두진건설	2024-06-28	262	2024-06-28	2024-10-25	개설
소규모 수도시설(남원지구) 개량공사	주식회사 예성건설	2024-06-28	222	2024-06-28	2024-10-25	개설
농어촌생활용수 급수취약지구(한경지구) 상수도 시설공사	주식회사 남현건설	2024-07-01	272	2024-07-01	2024-10-28	개설
농어촌생활용수 급수취약지역(우도지구) 상수도 시설공사	법윤토건 주식회사	2024-07-01	268	2024-07-08	2024-11-04	개설
원인자부담금(화북상업지구) 배수지 시설공사	지성종합건설 주식회사	2024-07-02	2,284	2024-07-15	2025-07-14	개설
추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업 전기공사	주식회사 광훈전력	2024-07-04	1,998	2024-07-15	2026-07-14	개설
노후 정수장(별도봉) 개량사업 비상발전기실 설치공사	㈜제이 에이치건설	2024-07-15	516	2024-07-15	2025-01-10	개설
노후 정수장(별도봉) 개량사업 비상발전기실 전기공사	토안건설주식회사	2024-07-17	90	2024-07-17	2025-01-12	개설
2024년 애월대블록 누수처 복구공사(2차)	세영토건주식회사	2024-07-23	194	2024-07-23	2025-05-18	개설
제주시 연동 소규모 하수관로 정비공사	진형건설(주)	2024-07-29	217	2024-08-01	2024-10-29	개설
2024년 표선대블록 누수처 복구공사	중원건설 주식회사	2024-08-01	195	2024-08-01	2025-01-27	개설
강정정수장 현대화사업 폐기물(석면)철거 및 처리공사	주식회사 우리건설	2024-08-01	54	2024-08-01	2027-01-17	개설
2024년 남원대블록 누수처 복구공사	명부건설(주)	2024-08-05	195	2024-08-05	2025-01-31	개설
원인자부담금(하귀1리) 상수도 시설공사	주식회사 나비건설	2024-08-19	312	2024-08-19	2025-02-14	개설

28. 각종 시설물 안전진단 실시현황

□ 2023년

(단위 : 천원)

시 설 물 명	용역비	기 간	진단결과 (정밀점검)	비고
2023년 광역상수도 1단계 시설물	96,296	'23.06.27.~'23.10.20.	B등급 (정밀안전점검)
2023년 광역상수도2단계 시설물	90,831	'23.06.23.~'23.10.20.	B등급 (정밀안전점검)
2023년 지방상수도 시설물	98,579	'23.07.12.~'23.10.20.	B등급 (정밀안전점검)
어승생제2저수지, 추자정수장	13,155	'23.10.11.~'23.12.08.	B등급 (정기안전점검)
동부하수처리장	9,516	ʼ23.02.14.~ʼ23.11.10.	A등급 (정기안전점검)
서부하수처리장	19,413	ʼ23.05.26.~ʼ23.10.26.	정기안전점검: 양호 (정밀안전점검: B등급)
보목하수처리장	14,890	ʼ23.02.09.~ʼ23.08.10.	정기안전점검: 양호 (정밀안전점검: B등급)
색달하수처리장	18,137	ʼ22.03.24.~ʼ22.09.30.	정기안전점검: 양호 (정밀안전점검: B등급)
대정하수처리장	18,810	ʼ23.05.15.~ʼ23.11.05.	정기안전점검: 양호 (정밀안전점검: B등급)
남원하수처리장	15,227	ʼ23.04.04.~ʼ23.11.30.	정기안전점검: 양호 (정밀안전점검: B등급)
성산하수처리장	17,685	ʼ23.02.16.~ʼ23.11.01.	정기안전점검: 양호 (정밀안전점검: B등급)
제주하수처리장	12,600	ʼ23.04.07.~ʼ23.12.12.	B등급 (정기안전점검)

□ 2024년

(단위 : 천원)

시 설 물 명	용역비	기 간	진단결과 (정밀점검)	비고
광역상수도 1·2단계 및 지방상수도 18개소	79,330	'24.04.19.~'24.06.20.	B등급 (정기안전점검)
유수암정수장	86,960	'24.06.25.~'24.10.22.	- (용역 진행 중)
회수정수장	60,166	'24.06.25.~'24.10.22.	- (용역 진행 중)
금악정수장	58,208	'24.07.08.~'24.11.04.	- (용역 진행 중)
서광정수장	90,441	'24.09.03.~'24.12.31.	- (용역 진행 중)
어승생제2저수지, 추자정수장	48,966	'24.09.03.~'24.12.01.	- (용역 진행 중)
동부하수처리장	16,731	ʼ24.01.22.~ʼ24.10.17.	정기안전점검: 용역 진행 중 (정밀안전점검: A등급)
서부하수처리장	5,052	ʼ24.05.16.~ʼ24.06.24.	양호 (정기안전점검)
보목하수처리장	10,000	ʼ24.02.23.~ʼ24.12.09.	양호 (정기안전점검)
색달하수처리장	9,960	ʼ24.03.11.~ʼ24.11.23.	양호 (정기안전점검)
대정하수처리장	4,842	ʼ24.06.07.~ʼ24.06.30.	양호 (정기안전점검)
남원하수처리장	10,053	ʼ24.01.26.~ʼ24.11.30.	양호 (정기안전점검)
성산하수처리장	4,992	ʼ24.03.19.~ʼ24.05.17.	양호 (정기안전점검)
제주하수처리장	21,975	ʼ24.03.26.~ʼ24.12.10.	- (용역 진행 중)

29. 도의회의 부대조건(의견) 내용 이행상황(최근3년간)

“ 해당사항 없음 ”

30. 각종 차입금 현황

□ 상수도사업

❍ 2023년 결산기준

(단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입 년도	차입 기간	차입금액	상환액	상환잔액	이자율
합 계				160,560	41,960	118,600
지역 개발 기금	지방상수도 노후관 개량사업	2010	15년	8,000	6,800	1,200	3.0%
	우도해저 상수도시설사업	2010	15년	1,000	850	150	3.0%
	상수도노후관 교체 및 시설개량	2011	15년	6,000	4,500	1,500	3.0%
	도서지역(추자도) 식수원 개발사업	2011	15년	1,260	945	315	3.0%
	제주도(Ⅲ)광역상수도 건설(어승생 제2저수지)	2011	15년	6,000	4,200	1,800	3.0%
	상수도관개량 및 유수율 제고사업	2012	15년	4,500	2,925	1,575	3.0%
	제주도(Ⅲ)광역상수도 건설(어승생 제2저수지)	2012	15년	2,900	1,740	1,160	3.0%
	스마트관망관리 인프라구축사업	2021	15년	3,000	-	3,000	2.0%
	애월정수장 고도정수처리시설사업	2021	15년	3,000	-	3,000	2.0%
	상수도사업특별회계 운영관리 (노후상수도관 교체사업, 정수장 및 취수원 시설보강사업)	2021	15년	7,000	-	7,000	2.0%
	노후정수장(월산) 개량사업	2022	15년	1,550	-	1,550	2.0%
	노후정수장(별도봉) 개량사업	2022	15년	2,150	-	2,150	2.0%
	상수도사업특별회계 운영관리 (도수관로 시설공사, 블록구축지역 유지관리)	2022	15년	5,200	-	5,200	2.0%
지역 개발 기금	블록구축지역 시설개선사업	2023	15년	1,000	-	1,000	3%
	노후정수장(별도봉정수장)개량사업	2023	15년	1,000	-	1,000	3%
	강정정수장 현대화사업	2023	15년	8,000	-	8,000	3%
	상수도사업특별회계 운영관리	2023	15년	4,000	-	4,000	3%
	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	2023	15년	2,500	-	2,500	3%
	조천정수장 고도정수처리시설 설치사업(전환사업)	2023	15년	1,500	-	1,500	3%
	노후 도·송수관로 이설 및 신설사업	2023	15년	1,000	-	1,000	3%
통합 관리 기금	유수율 제고사업	2019	5년	12,000	10,000	2,000	1.87%
	유수율 제고사업	2020	5년	20,000	10,000	10,000	1.41%
금융기관차입금	유수율 제고사업 및 노후관교체사업	2021	10년	17,000	-	17,000	2.83%
	동지역 유수율 제고사업	2022	10년	7,000	-	7,000	2.89%
	지방상수도 현대화사업 (노후상수관망정비)	2022	10년	2,000	-	2,000	2.89%
	블록구축지역 노후관교체 사업 지능형수처리운영센터 종합컨트롤 타워 구축사업	2022	10년	6,000	-	6,000	2.89%
	취·정수장 시설 및 설비개량 등	2022	10년	12,000	-	12,000	5.91%
	동지역 유수율 제고사업(2022년)	2022	10년	3,000	-	3,000	5.91%
	동지역 유수율 제고사업(2023년)	2023	10년	11,000	-	11,000	5.37%

❍ 향후 상환계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	원 금	이 자	비 고
총계	127,215	118,600	27,638
2024년	16,095	11,633	4,462
2025년	6,754	5,849	4,238
2026년	5,872	1,703	4,169
2027년	11,491	7,465	4,026
2028년	15,192	11,590	3,602
2029년	18,686	15,690	2,996
2030년	17,241	15,690	1,551
2031년	10,963	15,690	923
2032년	6,875	10,040	585
2033년 이후	18,046	23,250	1,086

□ 하수도사업

❍ 2023년 결산기준

(단위 : 백만원)

기금명	사업명	차입 년도	차입 기간	차입금액	상환액	상환잔액	이자율
합 계				300,800	68,376	232,424	-
지역 개발 기금	판포 하수처리장 방류수 재이용 사업	2009	15년	1,000	1,000	-	3.0%
	하수슬러지 자원화 시설 사업	2010	15년	1,000	900	100	3.0%
	제주시 읍면지역 하수관거 정비사업	2010	15년	11,200	10,080	1,120	3.0%
	제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	2010	15년	500	450	50	3.0%
	하수관거 정비사업	2011	15년	1,500	1,125	375	3.0%
	하수처리장 증설사업	2013	15년	15,000	9,000	6,000	3.0%
	제주위생처리장 개량사업	2014	15년	400	200	200	3.0%
	대정하수처리장 방류수 재이용사업	2014	15년	1,300	650	650	3.0%
	대정하수처리장 증설사업	2014	15년	3,500	1,750	1,750	3.0%
	하수관거 정비사업	2014	15년	10,500	5,250	5,250	3.0%
	농어촌 마을하수도 정비사업	2014	15년	900	450	450	3.0%
	소규모 하수관거 정비사업	2014	15년	750	375	375	3.0%
	색달하수처리장 증설사업	2014	15년	2,650	1,193	1,457	3.0%
	제주시 노형·이호지역 하수관로 정비사업	2015	15년	5,500	1,925	3,575	2.5%
	제주시 삼양·화북지역 하수관로 정비사업	2015	15년	6,000	2,100	3,900	2.5%
	제주시 외도지역 하수관로 정비사업	2015	15년	5,500	1,925	3,575	2.5%
	용담지역 하수관로 정비사업	2015	15년	3,000	1,050	1,950	2.5%
	제주시 노형·이호지역 하수관로 정비사업	2016	15년	4,000	1,200	2,800	2.5%
	제주시 삼양·화북지역 하수관로 정비사업	2016	15년	5,000	1,500	3,500	2.5%
	제주시 동지역 차집관로 개량사업	2016	15년	3,000	900	2,100	2.5%
	월정하수처리장 증설사업	2016	15년	3,000	900	2,100	2.5%
	보목하수처리장 증설사업	2016	15년	3,000	900	2,100	2.5%
	제주하수처리장 하수처리시설개량사업	2016	15년	2,000	600	1,400	2.5%
	미래수요대비 하수도 신규사업	2017	15년	12,000	1,800	10,200	2.0%
	제주시지역 하수처리장 운영	2017	15년	4,000	600	3,400	2.0%
	서귀포지역 서홍 동홍 하수관로 정비사업	2017	15년	3,000	450	2,550	2.0%
	제주시 동지역 차집관로 개량사업	2017	15년	1,000	150	850	2.0%
	보목하수처리장 증설사업	2018	15년	4,000	200	3,800	2.0%
	일도·이도동 하수관로 정비사업	2018	15년	3,500	175	3,325	2.0%
	연동·노형 노후 하수관로 정비사업	2018	15년	3,500	175	3,325	2.0%
	하수도사업 운영	2018	15년	5,000	250	4,750	2.0%
	제주시 동지역 차집관로 개량사업	2018	15년	1,000	50	950	2.0%
	제주시지역 하수처리장 운영	2018	15년	3,000	150	2,850	2.0%
	제주(도두)하수처리장 증설사업	2019	15년	3,000	-	3,000	2.0%
	하수관로 정비사업	2019	15년	10,000	-	10,000	2.0%
	하수도사업 운영	2019	15년	2,000	-	2,000	2.0%
	제주시지역 하수처리장 운영	2019	15년	5,000	-	5,000	2.0%
	제주서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계)	2020	15년	700	-	700	2.0%
	제주시 일도2동 노후 하수관로 정비사업	2020	15년	1,800	-	1,800	2.0%
	서귀포시 성산3 하수관로정비사업	2020	15년	2,000	-	2,000	2.0%
	서부(판포)하수처리장 증설사업	2020	15년	3,700	-	3,700	2.0%
	중문관광단지 하수관로 정비사업	2020	15년	2,050	-	2,050	2.0%
	오라아라지구 하수관로 정비사업	2020	15년	3,000	-	3,000	2.0%
	서귀포 색달하수처리장 개량사업	2020	15년	1,200	-	1,200	2.0%
	구좌처리분구 하수관로 정비사업	2020	15년	800	-	800	2.0%
	연동노형 노후 하수관로 정비사업	2020	15년	4,250	-	4,250	2.0%
	제주시지역 하수처리장 운영	2020	15년	4,000	-	4,000	2.0%
	대정 하수처리장 증설사업	2021	15년	1,100	-	1,100	2.0%
	제주공공하수처리시설 현대화사업	2021	15년	2,400	-	2,400	2.0%
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업	2021	15년	2,000	-	2,000	2.0%
	서귀포 예래·대륜 하수관로 정비사업 2단계	2021	15년	1,500	-	1,500	2.0%
	서귀포시 성산3 하수관로 정비사업	2021	15년	1,500	-	1,500	2.0%
	제주시지역 하수처리장 운영	2021	15년	3,500	-	3,500	2.0%
	도두(이호처리분구) 노후 하수관로 정비사업	2022	15년	2,300	-	2,300	2.0%
	오라아라지구 하수관로 정비사업	2022	15년	1,700	-	1,700	2.0%
	제주하수처리구역 차집관로 정비사업	2022	15년	500	-	500	2.0%
	서귀포시지역 하수처리장 관리운영	2022	15년	2,000	-	2,000	2.0%
	하수도사업 운영	2022	15년	2,100	-	2,100	2.0%
	서귀포 남원하수처리장 증설사업	2022	15년	400	-	400	2.0%
	제주시지역 하수처리장 운영	2022	15년	2,100	-	2,100	2.0%
	하귀2리 소규모 하수관로 정비사업	2023	15년	1,000	-	1,000	3.0%
통합 관리 기금	하수처리장 증설사업 등 3개 사업	2019	5년	20,000	13,333	6,667	1.98%
	하수관로 정비사업 외 1개 사업	2020	5년	7,000	2,333	4,667	1.25%
통합 관리 기금	하수처리장 증설사업 어업피해보상	2022	5년	5,000	-	5,000	4.62%
	제주시 하수처리장 증설 어업피해보상 등 3개사업	2023	5년	14,000	-	14,000	4.62%
금융 기관 차입금	서귀포시지역 하수처리장 관리운영	2021	10년	3,000	-	3,000	2.83%
	도두(이호처리분구) 노후 하수관로 정비사업	2021	10년	2,500	-	2,500	2.83%
	제주시 일도2동 노후 하수관로 정비사업	2021	10년	4,500	-	4,500	2.83%
	오라아라지구 하수관로 정비사업	2021	10년	3,000	-	3,000	2.83%
	도두하수처리구역 하수관로 정비사업	2022	10년	800	-	800	2.89%
	제주시 일도2동 노후 하수관로 정비사업	2022	10년	5,700	-	5,700	2.89%
	제주공공하수처리시설 현대화사업	2022	10년	6,500	3,287	3,213	2.89%
	제주시 소규모 하수관로 유지 및 정비	2022	10년	1,300	-	1,300	2.89%
	서귀포지역 소규모 하수관로 유지 및 정비	2022	10년	1,200	-	1,200	2.89%
	중문관광단지 하수관로 정비사업	2022	10년	2,900	-	2,900	2.89%
	서귀포시 성산3 하수관로 정비사업	2022	10년	800	-	800	2.89%
	서귀포시 보목토평 하수관로 정비사업	2022	10년	800	-	800	2.89%
	제주시지역 소규모 하수관로 유지 및 정비	2022	10년	1,800	-	1,800	5.91%
	서귀포지역 소규모 하수관로 유지 및 정비	2022	10년	1,700	-	1,700	5.91%
	서귀포시 성산3 하수관로 정비사업	2022	10년	1,500	-	1,500	5.91%
	도두(이호처리분구) 노후하수관로 정비사업	2023	10년	6,500	-	6,500	5.91%
	제주공공하수처리시설 현대화사업	2023	10년	12,500	-	12,500	5.91%

□ 향후 상환계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	원 금	이 자	비 고
상환잔액	271,353	232,424	38,929
2024년	28,911	21,920	6,991
2025년	24,192	17,650	6,542
2026년	28,313	22,258	6,055
2027년	33,807	28,490	5,317
2028년	32,624	2,8269	4,355
2029년	29,038	25,635	3,403
2030년	27,023	24,503	2,520
2031년	23,191	21,503	1,688
2032년	16,385	15,396	989
2033년 이후	27,869	26,800	1,069

31. 각종 소송(행정, 민사) 현황(최근 3년간)

□ 행정소송 : 총 4건

청구일자	원고 (청구인)	청구취지	재판(심판)결과	확정 일자
ʼ24.04.29.	황*철 외 4명	집행정지(재항고)	기각	ʼ24.08.23.
ʼ24.02.02.	김*아 외 5명	공공하수도설치(변경)고시 무효확인(항소)	진행중	-
ʼ23.12.13.	박*태	수돗물 이용 권리행사 방해행위 취소	진행중	-
ʼ22.10.25.	김*아외 21명	공공하수도설치(변경)고시 무효확인	패소	ʼ24.01.30.

□ 민사소송 : 총 9건

청구일자	원고 (청구인)	청구취지	재판(심판)결과	확정 일자
ʼ22.03.21.	㈜윤재	부당이익금 반환	2심 승소	ʼ24.01.10.
ʼ22.03.21.	㈜이로재	부당이익금 반환	2심 승소	ʼ24.01.10.
ʼ22.03.28.	㈜선재	부당이익금 반환	2심 승소	ʼ24.01.10.
ʼ22.08.30.	아이에스테크놀로지주식회사	임시지위보전과 계약체결 및 이행금지 가처분	기각	ʼ22.10.26.
ʼ22.11.29.	㈜ 솔라즈 외 2명	부당이익금 반환	1심 승소	ʼ24.09.09.
ʼ23.04.05.	(주) 운진	용역비 관련 ( 구좌성산 유수율제고사업 정산 )	심리중	-
ʼ23.05.12.	(주) 호영개발	부당이득금 반환	심리중	-
ʼ24.08.05.	주식회사 대저건설	간접공사비 등 청구	심리중	-
ʼ24.08.23.	국민건강 보험공단	구상금 청구	소장도달	-

32. 부서별 제주미래비전 실행과제 및 추진사항

❍ 건강하고 안정적인 용수공급체계 마련

｢제주미래비전｣ 실천과제	추진사항
① 수도정비계획(변경) 수립 추진	◦ 2040년 대비한 수도정비계획 변경 수립 - 환경부 승인 : ʼ22. 7. 28. - 수도정비계획 고시 : ʼ22. 11. 1. - 주요승인사항(투자규모 3조7404억원) · 정수장) 신설(2), 증설(6), 고도처리(4), 정수공정도입(5) · 배수지) 신․증설 54개소(55천㎥) · 관로 신설) 송수(D100~700, L=49.6㎞), 배수(D50~250, L=42.8㎞) · 유수율) 378블록, 구축노후관 교체(1,316㎞) · 시설물 개량) 17개 정수장 393건
② 신규수원 110천톤/일 개발	◦ 신규 취수원 110천톤/일 개발 - 삼양3수원 고도정수처리시설(1.5만톤) : ʼ19. 1 완료 - ʼ20년까지 : 100공ㆍ93,850톤 - ʼ21~22년 : 3공ㆍ3,000톤 - ʼ23~24년 : 10공ㆍ9,900톤
③ 상수관망 최적관망시스템 구축사업(도 전역 378개블록)	◦ 상수관망 최적관리시스템 구축 - ʼ11. 8.: 상수관망 최적관리 기본계획 수립 - ʼ16. ~ ʼ17.: 시범사업 추진 완료(오라,애월,토평) - ʼ17. ~ ʼ23.: 읍·면지역 블록구축 완료 - ʼ20. ~ ʼ26.: 洞 지역 유수율제고사업 추진 - ʼ20. ~ ʼ24.: 洞 지역(서부) 현대화사업 추진 - ʼ23. ~ ʼ26.: 애월 노후상수관망 정비사업 추진 - ʼ24. ~ ʼ29.: 구좌성산 노후상수관망 정비사업 추진 ＊ ʼ23. 12.: 제주도 洞지역 블록구축 완료 - 대블록 17개소, 중블록 116개소, 소블록 245개소
④ 수질 안정성 확보를 위한 수질관리 강화	◦ 우리집 수돗물 안심확인제 운영 - 수돗물 수질에 대한 불안감 해소를 위해 무료 수질검사 서비스 시행 - '23년 248건, '24년 8월말 기준 267건 검사
⑤ 물 절약 종합대책 추진	◦ 물 절약 종합대책 추진 - ʼ20년: 절수기기 보급 → 교육시설·사회복지시설 등 920개소・15,092설치(대․소변기,세면대,샤워기등) - ʼ21년: 절수설비 보급 → 교육시설·사회복지시설 등 13개소・202설치(대변기) - ʼ22년: 절수기기 보급 → 교육시설·사회복지시설 등 5개소・76설치(대변기) - ʼ23년: 절수기기 보급 → 교육시설·사회복지시설 등 10개소・105설치(대변기) - ʼ24년: 절수기기 보급 → 교육시설·사회복지시설 등 10개소・94설치(대변기,샤워기)
⑥ 블록구축지역 유지관리	◦ 블록구축지역 유지관리 - 시범지역(오라·토평중블록) : 동지역 유수율 제고사업에 포함하여 K-water에서 유지관리 - 애월대블록 : ʼ19년 ~ʼ25. 12월 - 성산 대블록 : ʼ21. 8월~ʼ22. 12월 - 한림한경, 대정안덕 대블록 : ʼ23. 1월~ʼ25. 12월 - 남원, 표선 대블록: ʼ21. 1월~ʼ25. 12월 - 조천 대블록 : ʼ24. 1월~ʼ25. 12월

❍ 안전한 수자원 이용을 위한 하수도 인프라 정비 확충

｢제주미래비전｣ 실천과제	추진사항
① 제주특별자치도 광역하수도 정비기본계획 변경 승인	◦ 2040년 목표 도 광역 하수도정비 기본계획(변경) 주요내용 - 투자규모 3조 3,331억원 - 공공하수처리시설 신·증설 9개소, 173천톤․6,980억원 - 하수관로 정비 1,350㎞(신설 477, 개량 873), 2조 5,858억원 - 월류수 처리시설·하수슬러지·분뇨처리시설 정비 493억원 ◦ 환경부 승인일 : 2023. 7. 13
② 안정적 하수처리를 위한 하수 처리시설 확충	◦ 하수처리시설 확충 - 사업기간 : 2015년 ~ 2029년 - 사 업 비 : 6,148억원 - 사 업 량 : 증설 50천톤 (266천톤/일→ 416천톤/일) ․ 제주(90), 동부(12), 서부(20), 대정(13), 색달(15)
③ 오수 및 분류식 하수관로 정비	◦ 하수관로 정비 - 사업기간 : 1996년 ~ 2040년 - 사 업 비 : 45,319억원 - 시설 및 정비내용 ․ 총사업량 : 6,719Km ․ ʼ23년까지 실적 : 5,539Km ․ ʼ24년 계획 : 30Km

33. 제주국제자유도시 종합계획 실행과제 및 추진사항

❍ 2-6 상·하수도 인프라 부문

｢제주국제자유도시｣ 실천과제	추진사항
① 제주 맞춤형 공급체계 구축	◦ 정수장 신설과 송수관로 확충 - 신규정수장 신설 사업 추진(1,000백만원) · 기본 및 실시설계 용역 행정절차 이행 : '24. 9. - 송수관로 및 비상연계관로 신설 사업(3,248백만원) · '23년도 송수관로 6.4km 완료(교래지구 외) · '23년도 비상연계관로 0.6km 완료(상예수원)
② 먹는 물 안전보장	◦ 정수장 고도화 사업 - 조천정수장 고도정수처리 시설사업(Q=37,000톤) 추진 중('23. ~ '26 / '24년 사업비 8,102백만원) - 토평정수장 고도정수처리 시설사업(Q=12,400톤) 추진 중('21. ~ '26 / '24년 사업비 5,370백만원) - 강정정수장 현대화사업(Q=25,000톤) 추진 중 ('22. ~ '26 / '24년 사업비 18,996백만원)
③ 수도사업 효율성 증대	◦ 상수도 현대화 사업 - 유수율 제고사업 추진('24년 사업비 21,500백만원) · 블록구축 378개소 완료 : '23. 12. · 세부단계시험과 누수복구공사 추진 : '24. - 서부지역 현대화사업 추진('24년 사업비 15,626백만원) · 블록시스템 구축 공사 추진 : '22. 8. ~ · 관망정비 공사 추진 : '23. 5. ~ - 노후상수관망 정비사업 추진('24년 사업비 13,696백만원) · 애월 노후상수관로 정비 추진 : '23. 1. ~ · 구좌·성산 노후상수관로 정비 추진 : '24. 1. ~ - 별도봉(Q=35,000톤) · 월산(Q=24,000톤) 정수장 현대화사업 : '24. 12. 준공 예정

｢제주국제자유도시｣ 실천과제	추진사항
④ 하수처리장 증설	◦ 제주하수처리장 증설사업(90천톤) - '23. 1. 실시설계 완료 - '23. 1.~ 4. 착공 전 각종 인허가 이행 - '23. 4. 시설공사 착공(현재 공정율 13%) ◦ 동부하수처리장 증설사업(12천톤) - '17. 9. 공사 착공 - '17. 12. ~ '23. 6. 공사 일시정지 - '24. 4. 집행정지 인용 공사정지(현재 공정율 31%) ◦ 서부하수처리장 증설사업(20천톤) - '20. 1. 재원협의 완료 - '21. 3. 공사 착공(현재 공정율 74%) ◦ 남원하수처리장 증설사업(8천톤) : '23. 8. 완료 ◦ 대정하수처리장 증설사업(8천톤) : '21. 7. 완료
⑤ 노후 하수관로 정비	◦ 하수관로 정비사업 추진 - 하수관로 신설 및 교체 추진 19개사업, 41㎞ · (제주시) 도두, 이호처리분구, 오라·아라, 서부, 조천, 하귀2리 등 · (서귀포시) 성산, 대정, 남원, 중문, 예래·대륜, 서홍·동홍, 보목·토평 등 ◦ 노후 차집관로 정비사업 추진 - 차집관로 정비를 위한 실시설계용역 등 추진 8건 · (제주시) 3건(동지역, 서부, 동부) 33억원, · (서귀포시) 5건 (동지역, 남원, 성산, 대정2) 42억원
⑥ 월류수 처리시설	◦ 월류수 처리시설 설치사업 추진 - ('16.~'21.) 하수도 월류수 처리시설 설치 가동 (5개소, Q=105,480톤/일) - ('24.1.~12.) 신시가지, 중문동부 월류수처리시설 추진 (Q=16,200㎥/일, 2,550백만원) - ('25.~'27.) 하수도 월류수처리시설 설치 가동 (7개소, Q=148,800톤/일)

｢제주국제자유도시｣ 실천과제	추진사항
⑦ 소규모 하수처리장 정상화	◦ 소규모하수처리장 통합공사 - 우도 농어촌마을 하수도 정비사업 ·하수관로 및 처리시설 준공 : '24. 5. - 추자도 농어촌마을 하수도 정비사업 ·실시설계 및 기본계획 변경 추진 : '24. 12. - 통합원격관리시스템구축 범사업(7,886백만원) ·실시설계 완료 : '23. 12. ·프로세스제어반 제작구매설치 추진 : '24. 2.~ · 정보통신공사 감리용역 발주 : '24. 7.

34. 지자체 합동평가 항목별 추진상황

“ 해당사항 없음 ”

35. 각종 T/F팀 운영 현황

1		동부하수처리장 증설사업 원활한 추진을 위한 소송대응 합동TF 구성

□ T/F팀 구성배경

□ “공공하수도설치(변경)고시 무효확인 소송” 1심 패소에 따라 관련 부서 합동 TF팀 구성 후 소송대응

※ 지사님 현안업무 보고('24. 2. 2.) 시 엄중 지시

□ 소송대응 T/F팀 구성․운영

❍ (운영총괄) 상하수도본부장

❍ (운영기간) ’24. 2. ~ 소송 및 행정심판 종료 시까지

❍ (구성인원) 사업 및 문화재, 환경영향평가, 건축허가, 법무 관계자 등 10여명

❍ (역할) 소송 및 행정심판 관련 전반적인 사항 논의

소 속	직 위	성 명	분 야	비 고
상하수도본부	본부장	좌재봉	T/F팀 운영 총괄
총무과	법무특별보좌관	-	법률 자문
총무과	대외협력특별보좌관	여창수	대외 자문
상하수도본부	하수도부장	고휘협	사업 담당
상하수도본부	하수시설과장	김영득	사업 담당
상하수도본부	주무관	고병구	사업 담당
특별자치법무담당관	법률전문가(주무관)	김은지	법률 자문
환경정책과	주무관	곽인철	환경영향평가 자문
세계유산문화재부	세계유산팀장	변희정	문화재 등 자문
제주시 건축과	건축행정팀장	고 숙	건축허가 자문
관광산업과	주무관	김정근	사업 전)담당자

36. 사업 완료 후 이관 받은 시설물 현황

“ 해당사항 없음 ”

37. 중앙단위 수상 실적 현황

“ 해당사항 없음 ”

38. 소관 시설물별 태풍 피해 및 복구 현황(최근 3년간)

피해 시설명	피해 내역		복구 현황
	피해물량	피해액 (백만원)	사업명	사업기간	사업비 (백만원)	사업자	사업내용
합 계		796.45			796.45
중문지하수	인입지점 및 계량기 접속부 파손 및 변압기 인입선 단선	3	강정정수장 중문지하수 태풍피해 복구 전기공사	ʼ22.09.14 ~ ʼ22.09.16	3	개미전력	전기공사 1식
시흥3(D-238)지하수	시흥3(D-238)지하수 고장	6	시흥3(D-328)지하수 긴급인양정비공사	ʼ22. 9. 8. ~ ʼ22. 9. 13.	6	규성(주)	지하수 인양정비 1개소
유수암정수장	비상발전기 자동전압조정(AVR)고장	0.45	유수암정수장 비상발전기 자동전압조정기(AVR) 수리작업 시행	ʼ22. 9. 16. ~ ʼ22. 9. 27.	0.45	월드발전기	전기공사 1식
보목하수처리장 해양방류관	해양방류관 파손	787	보목하수처리장 해양방류관 보수공사	ʼ23.01.05 ~ ʼ23.08.31	787	(주)승진건설	해양 방류관 보수 L=100m

39. 업무제휴·협약 사후관리 평가회 결과

“ 해당사항 없음 ”

40. 사업별 국비 반납 내역(최근 3년간)

□ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분		건 수	예산액	지출액	반납액 (국비)	반납율 (%)
하수도부	소 계	20	97,142	96,182	504	0.52
	2022	9	42,065	41,687	354	0.84
	2023	5	23,980	23,765	147	0.61
	2024	6	31,097	30,730	3	0.01

❍ 2022년

(단위 : 백만원, %)

사업명	예산액			지출액			집행잔액			국비 반납액 (반납율)	반납사유
	계	국비	지방비 등	계	국비	지방비 등	계	국비	지방비 등
삼화지구 도시침수 대응사업	4,772	2,386	2,386	4,481	2,095	2,386	291	291	-	291 (12%)	국고 정산 반납액 발생
제주시 일도이도동 하수관로 정비사업	2,364	1,088	1,276	2,348	1,072	1,276	16	16	-	16 (1.5)	국고 정산 반납액 발생
‘20년도 06 서귀포시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	7,328	5,010	2,318	7,327	5,009	2,318	1	1	-	1 (0.02%)	‘20년 BTL 임대료 집행잔액
‘20년도 06 제주시 동지역 하수관로 BTL사업 정산	3,619	1,770	1,849	3,618	1,769	1,849	0.8	0.8	0	0.8 (0.05)	국고 정산 반납액 발생
‘20년도 06 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	4,480	3,059	1,421	4,479	3,058	1,421	0.5	0.5	0	0.5 (0.02)	국고 정산 반납액 발생
‘20년도 08 제주시 동지역 하수관로 BTL사업 정산	5,040	2,514	2,526	5,039	2,513	2,526	0.6	0.6	0	0.6 (0..02)	국고 정산 반납액 발생
‘20년도 08 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	7,410	5,140	2,270	7,408	5,139	2,269	1.8	0.9	0.9	1.0 (0.02)	국고 정산 반납액 발생
‘20년도 09 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	3,637	2,543	1,094	3,636	2,543	1,093	0.4	0.2	0.2	0.2 (0.01)	국고 정산 반납액 발생
‘20년도 10 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	3,415	2,348	1,067	3,351	2,305	1,046	63	43	20	43 (1.8)	국고 정산 반납액 발생

❍ 2023년

(단위 : 백만원, %)

사업명	예산액			지출액			집행잔액			국비 반납액 (반납율)	반납사유
	계	국비	지방비 등	계	국비	지방비 등	계	국비	지방비 등
‘21년도 06 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	4,479	3,059	1,420	4,448	3,038	1,410	22	21	1	21 (0.7)	국고 정산 반납액 발생
‘21년도 08 제주시 동지역 하수관로 BTL사업 정산	5,040	2,514	2,526	5,039	2,513	2,526	0.6	0.6	-	0.6 (0.02)	국고 정산 반납액 발생
‘21년도 08 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	7,410	5,140	2,270	7,408	5,139	2,269	1.8	0.9	0.9	0.9 (0.02)	국고 정산 반납액 발생
‘21년도 09 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	3,637	2,544	1,093	3,636	2,543	1,093	0.2	0.2	-	0.2 (0.01)	국고 정산 반납액 발생
‘21년도 10 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	3,414	2,348	1,066	3,234	2,224	1,010	180	124	56	124 (5)	국고 정산 반납액 발생

❍ 2024년

(단위 : 백만원, %)

사업명	예산액			지출액			집행잔액			국비 반납액 (반납율)	반납사유
	계	국비	지방비 등	계	국비	지방비 등	계	국비	지방비 등
‘06 서귀포시 읍면지역 하수관로 정비 BTL사업	7,333	5,014	2,319	7,332	5,013	2,319	1	1	-	1 (0.01%)	‘22년 BTL 임대료 집행잔액
‘22년도 06 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	4,443	3,034	1,409	4,442	3,303	1,408	0.9	0.5	0.4	0.5 (0.02)	국고 정산 반납액 발생
‘22년도 08 제주시 동지역 하수관로 BTL사업 정산	5,041	2,514	2,527	5,039	2,513	2526	2.0	0.5	1.5	0.5 (0.02)	국고 정산 반납액 발생
‘22년도 08 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	7,410	5,140	2,270	7,048	5139	2269	0.9	1	0.9	1.0 (0.02)	국고 정산 반납액 발생
‘22년도 09 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	3,636	2,543	1,093	3,636	2543	1092	0.3	0.2	0.1	0.2 (-)	국고 정산 반납액 발생
‘22년도 10 제주시 읍면지역 하수관로 BTL사업 정산	3,234	2,224	1,010	3,233	2224	1009	0.3	0.2	0.1	0.2 (0.01)	국고 정산 반납액 발생

【 소관사항 】

1. 상하수도 분야 재정자립도 현황

2. 지방공기업 부채현황

3. 공기업특별회계 경상전출금 및 자본전출금 현황

4. 상하수도 현실화율 및 현실화 방안(향후 요금인상계획 포함)

5. 상하수도 경영합리화 사업 추진상황(최근 3년간)

6. 일반회계 전입금 현황

7. 제주특별자치도 수도정비계획 추진상황

8. 세부사업별 집행현황(예산 1억원 이상 시설비)

9. 상수도 원인자부담금 부과·징수현황(최근 3년간)

10. 상수원보호구역 주민지원사업 추진상황(최근 3년간)

11. 상수원보호구역 지정이후 재정비 등 주변여건을 반영한 보호구역 점검 관련 용역 현황

12. 상수원 보호구역 보호책 현황 및 보수실적

13. 절수설비 및 절수기기 보급현황(최근 3년간)

14. 물 절약 운동 추진 사업 및 실적(최근 3년간)

15. 맑은 물 공급을 위한 사업 추진 현황(최근 3년간)

16. 수돗물 도민만족도 설문 조사결과

17. 상수원수 지하수 수질검사 결과(최근 3년간)

18. 먹는물 및 지하수 수질검사 수수료 수입현황(최근 3년간)

19. 광역 및 지방상수도시설 가동 현황(최근 3년간)

20. 상수도 지하수 관정별 취수 현황(최근 3년간)

21. 상수도 배수지별 배수구역 및 배수가능량

22. 어승생 저수지 운영 및 관리 상황

23. 가뭄대비 물관리 대책 추진상황 및 향후계획

24. 급수불량지역 해소 추진 상황

25. 추자도 고도 정수처리시설 및 해수담수화 시설 운영 상황

26. 상수도 유휴시설 정비사업 추진현황

27. 수원지 생태하천 복원사업 추진 실적8

28. 취·정수장 시설별 법정 기술인력 및 확보현황

29. 취수원 및 배수지 개발 현황(최근 3년간)

30. 상수도 고도처리시설사업 추진상황

31. 사유지에 시설된 상수도시설 현황

32. 상수도 누수율 현황(최근 3년간) ※ 타 시‧도 비교 작성

33. 유수율 제고 사업 추진상황(최초부터)

34. 상수도관망최적관리시스템 구축사업 추진현황 및 계획

35. k-water, 제주특별자치도 간 협약 추진 상황

36. 블록시스템 구축 및 유지․관리에 따른 성과(효과)

37. 노후(20년이상) 상수도관 현황, 정비계획 및 추진실적

38. 제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획 추진상황

39. 하수관거 정비사업 추진상황(전체-BTL+재정사업)

40. 세부사업별 집행 현황(예산 1억원 이상 시설비)

41. 하수처리구역 내 하수관로 미설치 현황 및 향후설치계획

42. 사유지에 시설된 하수도시설 현황

43. 노후 차집관로 현황

44. 차집관로 정비사업 추진 현황 및 계획(최근 3년간)

45. 오수 유출사고 발생 및 처리 현황(최근 3년간)

46. 불명수 유입 현황, 원인 및 저감 대책

47. 하수처리장별 증설 현황 및 추진 계획

48. 하수처리장별 어업피해조사 관련

49. 소규모 공공하수처리시설 관리 현황(최근 3년간)

50. 하수처리장 방류수 재이용사업 추진상황 및 향후계획

51. 하수처리장별 근무인력 현황

52. 하수처리시설 주변 주민숙원사업 추진현황

53. 하수처리장별 방류수 기준 초과 현황(최근 3년간)

54. 하수처리장별 하수 발생 및 처리, 처리율 현황 (최근 3년간)

55. 하수처리장별 하수 슬러지 발생 및 처리현황(최근 3년간)

56. 하수 슬러지 자원화 시설사업 운영현황(최근 3년간)

57. 하수슬러지 민간위탁 추진상황(최근 3년간)

58. 하수처리시설 주변 해역 생태계 보전사업 추진 현황

59. 제주하수처리시설 현대화사업 추진 상황 및 계획

60. 중수도 관리 현황

1. 상하수도 분야 재정자립도 현황

□ 상 수 도

(단위: 백만원, %)

연도	세입규모			재정자립도(%) (A/C*100)	비고
	계(C=A+B)	자체세입(A)	의존세입(B)
2023년	215,301	117,449	97,852	54.5%	결산기준
2024년	229,570	118,398	111,172	51.6%	1회 추경 기준

□ 하 수 도

(단위: 백만원, %)

연도	세입규모			재정자립도(%) (A/C*100)	비고
	계(C=A+B)	자체세입(A)	의존세입(B)
2023년	365,747	154,867	210,880	42.3%	결산기준
2024년	332,284	110,523	221,761	33.3%	1회 추경 기준

2. 지방공기업 부채현황

□ 상 수 도

(단위 : 백만원)

계 정 과 목		당기('23년말)	비 고
합 계		126,867
유동부채		14,845
	미지급비용	418
	미지급금	696
	예수금	93
	선수금	2,005
	유동성장기지자체차입	11,633
비유동부채		112,022
	지역개발기금	45,634
	통합관리기금	3,334
	장기금융기관차입금	58,000
	퇴직급여충당부채	5,054
	장기소송충당부채	-

□ 하 수 도

(단위 : 백만원)

계 정 과 목		당기('23년말)	비고
합 계		502,929
유동부채		49,829
	미지급금	660
	미지급비용	409
	예수금	136
	유동성장기지자체차입금	21,920
	유동성장기BTL미지급금	26,704
비유동부채		453,100
	장기지자체차입금	156,791
	장기금융기관차입금	53,713
	BTL장기미지급금	239,809
	퇴직급여충당부채	2,787

3. 공기업특별회계 경상전출금 및 자본전출금 현황

□ 2023년도

(단위 : 백만원)

구 분		금액	내 용	비고
합 계		133,491	·경상전출금(36,640백만원) ·자본전출금(96,851백만원)
경 상 전출금	상수도	1,551	·상수원보호구역 주민지원사업 (균특이양): 51 ·동력비 지원: 1,500
	하수도	35,089	·지방채 원리금 상환: 19,589 ·인건비 및 기본경비: 15,500
자 본 전출금	상수도	34,704	·유수율 제고사업 추진 재원 지원: 17,300 ·균특·지방이양사업(7개 사업): 17,404
	하수도	62,147	·하수관로정비 BTL사업 임대료: 12,860 ·하수관로정비사업 지방비 부담금: 37,279 ·하수처리장 증설사업 지방비 부담금: 7,167 ·소규모 통합원격관리체계구축: 146 ·농어촌마을하수도정비사업: 2,427 ·환경기초시설 주변 보조금: 2,268

□ 2024년도

(단위 : 백만원)

구 분		금액	내 용	비고
합 계		131,335	·경상전출금(39,747백만원) ·자본전출금(91,588백만원)
경 상 전출금	상수도	4,051	·상수원보호구역 주민지원사업 (균특이양): 51 ·동력비 지원: 4,000
	하수도	35,696	·지방채 원리금 상환: 20,377 ·인건비 및 기본경비: 15,319
자 본 전출금	상수도	40,158	·유수율 제고사업 추진 재원 지원: 21,454 ·균특·지방이양사업(6개사업): 18,704
	하수도	51,430	·하수관로정비 BTL사업 임대료: 12,854 ·하수관로정비사업 지방비 부담금: 21,186 ·하수처리장 증설사업 지방비 부담금: 13,059 ·소규모 통합원격관리체계구축: 1,414 ·농어촌마을하수도정비사업: 700 ·환경기초시설 주변 보조금: 1,873 ·도시침수 지방비 부담금: 333 ·전기차 구입 보조금 지원: 11

4. 상․하수도 현실화율 및 현실화 방안

□ 요금현실화율                              (2023년 결산기준)

구 분	톤당 원가(원)	톤당 요금(원)	현실화율 (%)	연간결함액 (억원)	결함액보전 요금인상율	전국평균현실화율 (`23년 기준)
상수도	1,315.49	944.01	71.8%	319	39.4%	74.9%
하수도	3,083.77	912.74	29.6%	1,764	237.9%	46.8%

□ 필요성

❍ 상하수도 사업은 수익자부담 원칙의 공기업특별회계(독립채산제)적용, 원가대비 낮은 요금 체계로 만성적자 발생

* '23년 결산기준 누적적자액 : 12,162억원(상수도 366, 하수도 11,796)

❍ 유수율 제고사업, 하수처리장 증설사업 등 시설투자 비용은 매년 증가 추세이나 재원부족으로 인한 부채 및 적자액 증가는 재정여건 악화

❍ 투자재원확보 및 재정건정성 향상을 위해 적정수준의 요금 현실화 필요

□ 요금현실화 추진실적

❍ 연도별 요금 인상('11~'19년)

(단위 : %, 억원)

인상년도	인상율(%)		연 세입증대액(억원)			비고
	상수도	하수도	계	상수도	하수도
2011년	9.2	9.2	41	31	10
2013년	9.5	15.0	54	38	16
2015년	9.5	27.0	96	43	53
2017년	2.0	19.0	67	12	55
2019년	5.0 ~ 7.0	35.0	169	40	129

❍ 2022년부터 3단계* 점진적 요금 인상

(단위 : %, 억원)

연도별	인상율		연 세입증대액(억원)			비고
	상수도	하수도	계	상수도	하수도
2022년	5%	20%	222	83	139
2023년	5%	20%	126	18	108

□ 향후계획

❍ 지역경제 및 물가 등에 미치는 영향 등을 고려하여 도민 부담을

최소화하면서 전국평균 수준으로 단계적 현실화 추진

- 상·하수도 요금 현실화 방안 연구용역 실시: '25. 7. ~ 9.

5. 상하수도 경영합리화 사업 추진상황(최근 3년간)

□ 추진실적

❍ (상하수도요금 현실화) 상수도 5%, 하수도 20% 인상('23.1월 고지분부터)

❍ (이자수익 증대) 유휴자금의 정기예금 예치(260억)를 통한 세입 확충

- '24년 예금이자 세입(8월말 기준): 26.5억원(상수도 12.2억원, 하수도 14.3억원)

❍ (세출예산 절감) 주요 통계목별 5% 절감목표 설정 및 예산배정 유보('24년 54.6억)

❍ (국비재원 확보) 1,172억원(상수도 464억원, 하수도 708억원)

❍ (부채 적기상환) `23년 1,103억원 상환(상수도 419억원, 하수도 684억원)

※ 지방채 상환잔액('23년 결산기준) : 3,510억원

❍ 시설 운영합리화 및 에너지 절감 등 원가 절감

- '23년 전기안전관리자 자체 선임(정수장 6개소*)으로 수수료 절감: 135백만원

* 강정, 한림, 남원, 조천, 삼양1·2, 삼양3

- '23년 상·하수도태양광발전시설 운영으로 동력비 절감: 359백만원

- 태양광발전소 가동(도련·월산정수장)에 따른 신재생에너지인증서(REC) 거래: 190개·11백만원

- 하수처리장 전력수요관리(DR)사업*을 통한 세입 증대: 71백만원

* 국가 전력 비상상황 시 전기 의무 절약을 통해 전기사용을 감축하고 절약된 수익분을 보상받는 사업(동부하수처리장, 성산하수처리장)

- 하수관로 정비사업 시공방법 개선*을 통한 예산 절감: 2,344백만원

* 무진동 암파쇄 설계구간 공법변경, 펌프장 위치 조정 등 관로계획 변경 등 현장 여건을 반영한 시공방법 적용

□ 향후계획

❍ 적정한 요금 현실화율 제고로 공기업 경영여건 개선

❍ 생산원가 및 처리비용 절감, 경영개선시책 발굴 등 자구노력

□ 경영합리화 성과 연도별 비교표

2022년	2023년	2024년
❍ 상·하수도 요금 인상 추진 - 상수도 5% / 하수도 20% ❍ 금리 비교분석을 통한 정기예금 예치: 240억원 - (상수도) 150억원 - (하수도) 90억원 * 이자세입: 9.8억원 ❍ 세출예산 절감: 50억원 - (상수도) 23억원 - (하수도) 27억원 ❍ 국비 재원 확보: 863억원 - (상수도) 256억원 - (하수도) 607억원 ❍ 원가 절감 노력 - 전기안전관리자 자체 선임으로 수수료 절감: 1.4억원 - 태양광발전시설 운영으로 동력비 절감: 4.5억원 - 응집제 사용량 감소를 위한 공법 혼합 운용 절감: 2.6억원 ❍ 하수도 자산관리체계 구축을 위한 자산실사 용역 추진: '22. 5. ~ '23. 2. ❍ 지방채 조기상환: 32억원	❍ 상·하수도 요금 인상 추진 - 상수도 5% / 하수도 20% ❍ 금리 비교분석을 통한 정기예금 예치: 460억원 - (상수도) 160억원 - (하수도) 300억원 * 이자세입: 13억원 ❍ 세출예산 절감 - (상수도) 28억원 - (하수도) 40억원 ❍ 국비 재원 확보: 1,037억원 - (상수도) 265억원 - (하수도) 772억원 ❍ '22년 대비 지방채 발행 규모 축소(160억원↓) - ('22) 800억원 / ('23) 640억원 ❍ '23년 지방공기업 경영평가(상수도) : ‘다’등급 - 직전 평가 대비 1등급 상승	❍ 상·하수도 요금 인상 추진 - 상수도 5% / 하수도 20% ❍ 금리 비교분석을 통한 정기예금 예치: 260억원 - (상수도) 150억원 - (하수도) 110억원 * 이자세입: 26억원 ❍ 세출예산 절감(목표액) - (상수도) 23억원 - (하수도) 32억원 ❍ 국비 재원 확보: 1,172억원 - (상수도) 464억원 - (하수도) 708억원 ❍ '24년 지방공기업 경영평가(하수도) : ‘다’등급 - 직전 평가 대비 순위 상승(7위 → 3위)

6. 일반회계 전입금 현황

(단위 : 백만원)

구 분		전입금	재원내역	비고
합 계		264,826
2023	소 계	133,491
	상수도 공기업	36,255	·동력비 재정지원 : 1,500 ·상수원보호구역 주민지원사업 (균특이양) : 51 ·유수율 제고사업 추진 재원 지원 : 17,300 ·균특회계 균특·지방 이양사업(6개사업) : 17,404
	하수도 공기업	97,236	·하수도공기업 경상비(채무상환 등) 재정 지원 : 35,089 ·하수관로 정비사업 지방비 부담금 : 37,279 ·하수처리장 증설사업 지방비 부담금 : 7,167 ·하수관로 BTL사업 임대료 : 12,860 ·환경기초시설 주변보조금 : 2,268 ·소규모 통합원격관리체계 구축 : 146 ·농어촌마을하수도정비사업 : 2,427
2024	소 계	131,335
	상수도 공기업	44,209	·상수원보호구역 주민지원사업 (균특이양) 51 ·동력비 재정지원 : 4,000 ·유수율 제고사업 추진 재원 지원 : 21,454 ·균특회계 균특·지방 이양사업 (7개 사업) : 18,704
	하수도 공기업	87,126	·하수도공기업 경상비(채무상환 등) 재정 지원 : 35,696 ·하수관로 정비사업 지방비 부담금 : 21,186 ·하수처리장 증설사업 지방비 부담금 : 13,059 ·하수관로 BTL사업 임대료 : 12,854 ·도시침수 지방비 부담금: 333 ·소규모 통합원격관리체계 구축 : 1,414 ·농어촌마을하수도정비사업 : 700 ·환경기초시설 주변보조금 : 1,873 ·전기차 구입 보조금 지원: 11

7. 제주특별자치도 수도정비계획 추진상황

□ 목 적

❍ (수도정비계획) 「수도법」 제5조에 따라 수립하는 수도시설의 적정하고 합리적인 정비에 관한 종합적인 계획

⇒ Zero Base에서 지역 여건을 고려하여 기후위기, 대규모 개발사업 증가 등 급변하는 사회변화를 반영한 급수 수요 대응 방안 마련

□ 사업개요

❍ (사업기간) 2024. 01. ~ 2026. 03.

❍ (사업위치) 제주특별자치도 전역

❍ (용 역 비) 2,750백만원(’24년 사업비 1,000백만원)

❍ (주요내용)

- 미래 용수 수요 대비 수도시설 확충·개량 계획, 유수율 제고 등 상수도 시설 정비에 관한 전반적인 사항과 구체적인 대안 제시

□ 추진상황

❍ ʼ24. 03. 18. : 수도정비계획(변경) 수립 및 기술진단 용역 계약심의 완료

❍ ʼ24. 05. 07. : 계약심사 완료

❍ ʼ24. 06. 21. : 건설기술심의위원회 심의

❍ ʼ24. 06. 28. : 구매규격 사전 공개

❍ ʼ24. 08. 23. : 사업수행 능력 평가 완료

❍ ʼ24. 09. : 용역 업체 선정을 위한 입찰 공고 중

□ 향후계획

❍ ʼ24. 09. : 용역업체 선정

❍ ʼ24. 09. ~ ʼ26. 03. : 수도정비계획(변경) 수립 용역 추진

8. 세부사업별 집행 현황(예산 1억원 이상 시설비)

□ 2023년도

(단위 : 천원)

세부사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)	비 고
합 계	91,266,410	68,050,261	23,216,149
급수취약지역 개선사업	3,000,000	2,916,990	83,010
노후 상수관로 정비사업	1,800,000	958,650	841,350
노후정수장 개량사업	5,337,198	4,304,464	1,032,734
도서지역 해수담수화시설 개량 및 증설사업	1,800,000	1,031,317	768,683
도송수관로 이설 교체 및 신설 사업	4,143,503	4,053,495	90,008
블록구축지역 노후관교체사업	1,123,594	1,087,716	35,878
블록구축지역 시설개선사업	10,223,507	6,783,935	3,439,572
블록구축지역 유수율 유지관리	3,900,000	2,378,398	1,521,602
삼양3수원지~도련정수장 간 도수관로 시설공사	214,799	182,596	32,203
스마트 원격검침 시스템 구축	876,000	875,959	41
식수전용 저수지확충사업	4,682,265	3,882,637	799,628
애월정수장고도정수처리시설사업	9,792,481	9,251,736	540,745
온실가스 감축설비 지원사업	1,053,030	844,016	209,014
원인자부담금 상수도 시설사업	6,096,729	4,786,924	1,309,805
정수장 위생관리 개선사업	759,000	458,721	300,279
조천정수장 고도정수처리시설사업	6,158,218	4,804,962	1,353,256
지능형 수처리 운영센터 종합컨트롤타워 구축사업	4,323,788	4,300,173	23,615
지하수관정 시설 운영	900,000	889,561	10,439
추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	9,791,790	1,075,713	8,716,077
취·정수장 노후 수배전반, 계장제어반 및 비상발전기 설치 사업	4,386,722	3,750,907	635,815
취·정수장 멤브레인 교체사업	700,000	690,701	9,299
취·정수장 환경정비사업	960,000	937,805	22,195
친환경 대체취수원 개발사업	5,924,310	4,960,031	964,279
토평정수장 고도정수처리시설사업	2,946,125	2,534,314	411,811
한림정수장 고도정수처리시설 증설사업	373,351	308,540	64,811

□ 2024년도

(2024 8. 31.기준 / 단위 : 천원)

세부사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)	비 고
합 계	110,666,110	40,766,546	69,899,564
가파담수장 해수담수화 개량 및 증설사업	5,176,382	256,474	4,919,909
강정정수장 현대화사업	23,872,974	7,123,791	16,749,183
급수취약지역 개선사업	3,000,000	1,446,775	1,553,225
노후 상수관로 정비사업(애월)	7,627,350	137,699	7,489,651
노후정수장 개량사업	1,432,734	120,493	1,312,240
도송수관로 이설 교체 및 신설 사업	2,858,000	984,041	1,873,959
마라담수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	3,237,300		3,237,300
블록구축지역 시설개선사업	5,571,922	3,110,565	2,461,357
블록구축지역 유수율 유지관리	2,975,536	392,339	2,583,197
상수도관로 GIS DB 구축	100,000		100,000
상수원보호구역 토지매입	200,000	198,956	1,044
소독설비 개량사업	330,000	302,776	27,224
소형생물 대응체계 구축사업	1,565,278	285,837	1,279,441
수도정비기본계획 수립용역	1,000,000		1,000,000
스마트 원격검침 시스템 구축	300,000		300,000
식수전용 저수지확충사업	4,285,860	2,758,498	1,527,362
신규 정수장 개발사업	1,000,000		1,000,000
온실가스 감축설비 지원사업	782,663	222,900	559,764
원인자부담금 상수도 시설사업	6,181,052	1,260,853	4,920,200
조천정수장 고도정수처리시설사업	9,455,256	7,013,026	2,442,230
지하수관정 시설 운영	800,000	370,052	429,948
추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	15,214,077	8,590,022	6,624,054
취·정수장 노후 수배전반, 계장제어반 및 비상발전기 설치 사업	1,598,202	613,953	984,249
취·정수장 환경정비사업	700,000	39,381	660,619
친환경 대체취수원 개발사업	4,199,714	1,906,251	2,293,463
토평정수장 고도정수처리시설사업	5,781,810	3,631,864	2,149,947
해저관로 유지관리사업	1,420,000		1,420,000

9. 상수도 원인자부담금 부과·징수현황(최근 3년간)

□ 2022년도

(단위 : 천원)

사업 시행자	사 업 명	부과액	징수액	비고
합 계	17건	12,173,245	12,173,245
(주)하나자산신탁	서귀포시 대정읍 보성리 780번지 일원 공동주택 개발사업	691,752	691,752
한국자산신탁(주)	제주시 용담2동 481-3일원 공동주택 건축사업	301,416	301,416
(주) 하나자산신탁	제주 연동 나인몰 조성사업	57,568	57,568	관로시설비
제주지방항공청	제주국제공항 관제탑 신축사업	33,050	33,050
㈜시에나	관광숙박시설 신축사업	77,141	77,141	관로시설비
(주)노형산업개발	제주시 노형동 904-1번지 생활형 숙박시설	110,632	110,632	분납3차분
		88,482	88,482	관로시설비
(주)모두디앤비	연동 262-26번지 생활형 숙박시설	77,390	77,390	관로시설비
제주시 도시재생과	제주시 화북동 1400번지 일원 화북상업지역 도시개발사업	4,953,338	4,953,338
		2,500,000	2,500,000	관로시설비
도 소상공인기업과	대정농공단지	240,359	240,359	관로시설비
		127,573	127,573	분납4차분
도 소상공인기업과	구좌농공단지	383,838	383,838
		350,000	350,000	관로시설비
탐라사랑(주)	제주대학교 생활관 4차	153,254	153,254
서귀포시 체육진흥과	표선민속관광지내 문화체육복합센터	223,554	223,554
밸류1호 제주피에프브이	청향관광호텔	674,880	674,880
애월지역주택조합	제주시 애월읍 광령리 2680번지 일원 공동주택개발사업	261,516	261,516
보광종합건설(주)	서귀포시 색달동 노인국제휴양타운 조성사업	386,650	386,650
신한자산신탁 (주)	제주시 애월읍 하귀1리 21-2일원 주택건설사업	476,634	476,634
한국공항공사 제주지역본부(제주시설단)	제주공항 야외분수대 신규상업시설 신축	4,218	4,218

□ 2023년도

(단위 : 천원)

사업 시행자	사 업 명	부과액	징수액	비고
합 계	8건	5,850,797	5,850,797
밸류1호제주피에프브이	청향관광호텔	704,837	704,837	관로시설비
한국자산신탁 (주)	제주시 용담2동 481-3일원 공동주택 건축사업	489,808	489,808	관로시설비
제주시 도시재생과	화북상업지역	3,700,000	3,700,000	관로시설비
		277,368	277,368	계획급수량 변동
한국공항공사 제주공항	제주국제공항 집하관리동 및 주차장 화장실 신축사업	1,813	1,813
한국공항공사 제주공항	제주공항 자전거 토탈케어샵 신축공사	320	320
(주)테라에셋	서홍동 441-2 단독주택 조성사업	186,702	186,702
소상공인기업과	구좌농공단지 조성사업	400,000	400,000	관로시설비
		89,949	89,949	관로시설비 (정산)

□ 2024년도

(단위 : 천원)

사업 시행자	사 업 명	부과액	징수액	비고
합 계	3건	887,377	887,377
신한자산신탁 (주)	제주시 애월읍 하귀1리 21-2일원 주택건설사업	582,555	582,555	관로시설비
그레이스제이	법환동 1546 주택건설사업	253,274	253,274
제주시	협재유원지	51,548	51,548

10. 상수원보호구역 주민지원사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 천원)

연도별	사 업 명	사 업 량	사업비	비고
2022	계		141,112
	학자금지원	금산·삼양·외도 상수원보호구역 대학생 5명 등록금 지원	11,112
	상수원보호구역 환경정화사업	외도·삼양·금산·강정·옹포 상수원보호구역 환경정화사업 및 물 절약 캠페인 등	30,000
	상수원보호구역 친환경 유기질비료 지원사업	강정·외도 상수원보호구역 경작지 친환경 유기질비료 지원 총 73필지 231,454㎡ □강정 69필지 220,581㎡ □외도 4필지 10,873㎡	100,000
2023	계		131,818
	학자금지원	금산·삼양·외도 상수원보호구역 대학생 5명 등록금 지원	7,818
	상수원보호구역 환경정화사업	외도·삼양·금산·강정 상수원보호구역 환경정화사업 및 물 절약 캠페인 등	24,000
	상수원보호구역 친환경 유기질비료 지원사업	강정·외도 상수원보호구역 경작지 친환경유기질비료 지원 총 74필지 236,569㎡ □강정 71필지 227,899㎡ □외도 3필지 8,670㎡	100,000
2024	계		141,200
	학자금지원	금산·삼양·외도 상수원보호구역 대학생 7명 등록금 지원(상반기)	11,200
	상수원보호구역 환경정화사업	외도·삼양·금산·강정·옹포 상수원보호구역 환경정화사업 및 물 절약 캠페인 등	30,000
	상수원보호구역 친환경 유기질비료 지원사업	강정·외도 상수원보호구역 경작지 친환경유기질비료 지원 총 76필지 233,295㎡ □강정 73필지 224,625㎡ □외도 3필지 8,670㎡	100,000

11. 상수원보호구역 지정이후 재정비 등 주변여건을 반영한 보호구역 점검 관련 용역 현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업비	사업기간	용역업체	과업개요	비고
외도수원지 외 2개소 상수원보호구역 일부 해제 용역	44	2023. 7. 19. ~ 2024. 1.14.	(주) 산들엔	외도, 금산, 삼양 상수원보호구역 일부 해제를 위한 기초자료 수집 및 현장조사 등

※ 환경부 협의 등 행정절차 이행을 위해 용역 중지 중(‘24. 1. 9. ~ 현재)

12. 상수원 보호구역 보호책 현황 및 보수실적

□ 현  황

번 호	보호구역명	면 적(천㎡)	지정일자	취수능력(톤/일)	비고
11개소		1,816		131,550
1	어 승 생	1,322	ʼ77. 08. 01.	15,000
2	외 도	140	ʼ72. 07. 31.	14,000
3	금 산	12	ʼ74. 07. 23.	18,500
4	삼 양	11	ʼ74. 07. 23.	35,000
5	옹 포	5	ʼ74. 07. 23.	20,000
6	추자1저수지	17	ʼ78. 11. 29.	100
7	추자2저수지	9	ʼ78. 11. 29.	50
8	추자3저수지	35	ʼ78. 11. 29.	1,200
9	강 정	254	ʼ74. 07. 23.	25,000
10	상 예	1	ʼ78. 11. 29.	1,700
11	서 홍	10	ʼ74. 07. 23.	1,000

□ 보수실적

구 분	보호구역명	사업량	사업비	비고
2023	추자1·2·3	울타리 철거 후 재설치	17,513천원
2024	강정	경계울타리 방법망 설치 방범 CCTV 설치 등	20,000천원	(예정)

13. 절수설비 및 절수기기 보급현황(최근 3년간)

□ 절수설비 및 절수기기 실태점검 결과 (행정시 포함)

년도	점검반	점검기간	점검대상 (의무대상시설)	점검결과	비고
2022	1개반 (2명)	ʼ22. 09. ~ 11.	설치의무대상 1,031개소	- 사업장 점검 243개소 · 유입밸브 조정 등 현지시정 · 인증 절수설비 설치 홍보 등	제주시
	2개반 (5명)	ʼ22. 09. ~ 12.	설치의무대상 769개소	- 사업장 점검 70개소 · 유입밸브 조정 등 현지시정 · 물 절약 생활화 홍보 등	서귀포시
2023	1개반 (2명)	ʼ23. 04. ~ 09.	설치의무대상 1,009개소	- 사업장 점검 156개소 · 유입밸브 조정 등 현지시정 · 인증 절수설비 설치 홍보 등	제주시
	2개반 (4명)	ʼ23. 09. ~ 12.	설치의무대상 801개소	- 사업장 점검 76개소 · 유입밸브 조정 등 현지시정 · 물 절약 생활화 홍보 등	서귀포시
2024	1개반 (2명)	ʼ24. 09. ~ 12.	설치의무대상 1,028개소	- 점검 중 (160개소) · 유입밸브 조정 등 현지시정 · 인증 절수설비 설치 홍보 등	제주시
	2개반 (4명)	ʼ24. 09. ~ 12.	설치의무대상 801개소	- 점검 중 (80개소) · 유입밸브 조정 등 현지 시정 · 물 절약 생활화 홍보 등	서귀포시

□ 계약현황

(단위 : 천원)

년도	입찰방법	계약업체	계약기간	계약금액	비고
2022	조달구입	㈜제인테크	ʼ22.06.24. ~ 12.09.	19,694	제주시
	조달구입	㈜여명테크	ʼ22.06.20. ~ 08.09.	19,713	서귀포시
2023	조달구입	㈜여명테크	ʼ23.04.10. ~ 05.29.	34,759	제주시
	조달구입	㈜여명테크	ʼ23.05.11. ~ 06.30.	19,713	서귀포시
2024	수의계약	㈜제인테크	ʼ24.04.17. ~ 05.16.	17,258	제주시
	수의계약	㈜제인테크	ʼ24.06.14. ~ 06.30.	19,608	서귀포시

□ 2022년 절수설비 설치 현황

【총괄】

❍ 대상시설 : 사회복지시설 등

❍ 사 업 량 : 절수설비(대변기) 76개 설치

❍ 사 업 비 : 40,000천원

❍ 사업기간 : '22. 5. ~ 12.

구분	시설명	절수기기 보급현황
		계	세면대	대변기	주방용		샤워기
					코브라형	자바라형
합계		76	-	76	-	-	-
제주시	사회복지시설 등	38	-	38	-	-	-
서귀포시	사회복지시설 등	38	-	38	-	-	-

□ 2023년 절수설비 설치 현황

【총괄】

❍ 대상시설 : 사회복지시설 등

❍ 사 업 량 : 절수설비(대변기) 105개 설치

❍ 사 업 비 : 55,000천원

❍ 사업기간 : '23. 5. ~ 12.

구분	시설명	절수기기 보급현황
		계	세면대	대변기	주방용		샤워기
					코브라형	자바라형
합계		105	-	105	-	-	-
제주시	사회복지시설 등	67	-	67	-	-	-
서귀포시	사회복지시설 등	38	-	38	-	-	-

□ 2024년 절수설비 설치 현황

【총괄】

❍ 대상시설 : 사회복지시설 등

❍ 사 업 량 : 절수설비(대변기 등) 94개 설치

❍ 사 업 비 : 40,000천원

❍ 사업기간 : '24. 5. ~ 12.

구분	시설명	절수기기 보급현황
		계	세면대	대변기	주방용		샤워기
					코브라형	자바라형
합계		94	-	74	-	-	20
제주시	사회복지시설 등	56	-	36	-	-	20
서귀포시	사회복지시설 등	38	-	38	-	-	-

14. 물 절약 운동 추진 사업 및 실적(최근 3년간)

□ 세계 물의 날과 연계한 물 절약 운동 전개

□ 물 절약의 중요성을 알리는 세계 물의 날 행사 (매년 3. 22.전후)

- 물 절약 길거리 캠페인 전개(행정시 공동)

□ 초등학생 대상 물사랑공모전 개최

- (주제) 물의 소중함과 중요성을 제고할 수 있는 내용

- (공모분야) 4개 부문(포스터, 산문, 서예, 서각)

※ ʼ22년 201건(80명 시상), ʼ23년 84건(47명 시상), ʼ24년 152건(49명 시상)

□ 물 사랑 및 절약 홍보 강화

□ 언론매체를 통한 물 사랑․물 절약 홍보 추진상황

구 분	방송	라디오	기타(온라인 등)	홍보물품 제작 등
2022년	1	3	2	1
2023년	1	2	5	1
2024년	-	-	-	1

※ 2024. 9월 현재 TV, 라디오 방송안 제작 중

□ 절수설비(기기) 보급 사업 추진

□ 물 절약 종합대책 수립 추진('17.10월 도 ⇒ 관련부서, 행정시)

- 건축 준공 시 절수설비 설치 확인서 제출(건축주) 후 확인 절차 이행

□ 절수설비 의무설치 사업장에 대한 계도 안내문 발송(행정시)

□ '22년도 절수설비 보급사업 추진

- 사회복지시설 등 대변기 76개 설치

□ '23년도 절수설비 보급사업 추진

- 사회복지시설 등 대변기 105개 설치

□ '24년도 절수설비 보급사업 추진 중

- 사회복지시설 등 대변기 등 94개 설치

15. 맑은 물 공급을 위한 사업 추진 현황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

구 분	ʼ22년		ʼ23년		ʼ24년 8월		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	9개사업	34,315	10개사업	55,843	10개사업	56,797
노후관 교체 사업	노후관교체 55km	11,300	노후관교체 18.1km	7,230	노후관 교체 5.5km	2,508
농어촌 생활용수 개발사업	관로정비 11.6km	3,000	관로정비 8.86km	3,000	관로정비 11km	3,000
소규모 수도시설 개량사업	관로정비 5.3km	2,000	관로정비 6.45km	2,858	관로정비 8km	2,858
조천정수장 고도정수처리시설사업	고도정수 처리시설 37,000톤	2,836	고도정수 처리시설 37,000톤	5,445	고도정수 처리시설 37,000톤	8,102
토평정수장 고도정수처리시설사업	고도정수 처리시설 12,400톤	1,470	고도정수 처리시설 12,400톤	2,425	고도정수 처리시설 12,400톤	5,370
추자정수장빗물고도및해수담수시설개량사업	해수담수화시설 개량·증설사업 기본 및 실시 설계용역	2,000	해수담수화시설 개량 및 증설	9,003	해수담수화시설 개량 및 증설	6,498
마라,가파 해수담수화시설 개량 및 증설사업	-	-	해수담수화시설 개량 및 증설 기본 및 실시 설계용역	1,800	해수담수화시설 개량 및 증설 기본 및 실시 설계용역	7,645
노후정수장 (월산,별도봉) 개량사업	노후정수장 개량 및 현대화	6,466	노후정수장 개량 및 현대화	3,124	노후정수장 개량 및 현대화	400
강정정수장 현대화사업	노후정수장 개량 및 현대화	1,300	노후정수장 개량 및 현대화	16,654	노후정수장 개량 및 현대화	18,996
협재~비양도 해저송수관로 유지관리사업	-	-	-	-	해저 및 육상 상수도관로 확충	1,420
애월정수장 고도정수처리 시설사업	고도정수 처리시설 23,000톤	3,943	고도정수 처리시설 23,000톤	4,304	사업 준공

16. 수돗물 도민만족도 설문 조사결과

□ 2021년도 조사 개요

□ 조사근거 : 수도법 제29조의2(2020. 3. 31.신설)에 따라 국민에게 안전하고 질 좋은 수돗물을 공급하기 위하여 3년마다 수돗물 먹는 실태조사 실시

※ 2024년 조사기간: 2024. 4. 22. ~ 6. 30.(조사 결과 11월 발표 예정)

□ 조사항목 : 수돗물에 대한 음용행태, 정보․인식수준, 만족도 등

□ 조사기관 : 환경부․한국상하수도협회

□ 조사범위 및 규모 : 전국 161개 지자체 72,460가구(제주 730가구)

□ 조사내용 : 수돗물 음용/사용 등 활용 수준, 만족도 파악, 수돗물 관련 정책 우선순위 결정 등

□ 2021년 설문조사 결과(제주)

□ 물 먹는 방법(중복응답)

수돗물에 정수기를 설치해서	수돗물을 그대로 먹거나 끓여서(보리차 등 포함)	먹는 샘물(생수)을 구매해서	우물물, 지하수, 약수로	기타	집에서 물을 먹지 않음	물 먹는 횟수(일주일 평균)
29.7	42.7	58.4	0.1	0.2	0.0	26.9

□ 물을 먹을 때 주 이용 방법 선택 이유

믿을 수 있어서	편리해서	맛이 좋아서	습관적으로	경제적이어서	주변에서 권하거나 사용해서	기타
59.0	23.3	4.6	8.3	3.5	0.6	0.7

□ 물을 먹을 때 주된 방법에 대한 만족도

매우 만족	약간 만족	보통	약간 불만족	매우 불만족	종합			평균 (점)
					만족	보통	불만족
37.7	47.5	14.4	0.4	0.0	85.2	14.4	0.4	4.22

□ 먹는 수돗물에 대한 전반적 만족도

매우 만족	약간 만족	보통	약간 불만족	매우 불만족	종합			평균 (점)
					만족	보통	불만족
17.7	48.6	29.2	3.8	0.7	66.3	29.2	4.5	3.79

□ 수돗물을 그대로 먹거나 끓여서 먹는 경우(‘그렇다’ 비율)

수질을 믿을 수 있다	맛이 좋다	편리하다	경제적이다	건강에 도움이 된다	환경에 도움이 된다
61.1	48.7	75.5	75.5	47.2	66.7

□ 수돗물을 정수기로 먹는 경우(‘그렇다’ 비율)

수질을 믿을 수 있다	맛이 좋다	편리하다	경제적이다	건강에 도움이 된다	환경에 도움이 된다
66.9	58.8	77.6	23.9	50.4	30.1

□ 먹는 샘물(생수) 구매하는 경우(‘그렇다’ 비율)

수질을 믿을 수 있다	맛이 좋다	편리하다	경제적이다	건강에 도움이 된다	환경에 도움이 된다
90.8	86.8	69.3	21.6	77.8	15.0

□ 공공요금 대비 수도요금의 경제적 부담 정도

전혀 부담스럽지 않다	별로 부담스럽지 않다	보통이다	어느 정도 부담스럽다	매우 부담스럽다	종합			평균 (점)
					부담 스럽지 않다	보통이다	부담 스럽다
7.2	51.6	28.5	11.3	1.4	58.8	28.5	12.7	3.52

□ 수도요금을 줄이기 위해 실천하고 있는 사항(중복응답)

양치컵 사용하기	빨래 모아서 하거나 세제 사용량 줄이기	비누칠할 때 물 잠그기	샤워시간 줄이기(또는 욕조사용 안하기)	물 받아서 사용 후 재사용하기	화장실 변기에 벽돌, PET병 등 넣기	절수형 변기로 교체하기	싱크대, 세면대 등에 절수장치 설치	기타	실천하고 있는 사항 없음
55.5	52.9	39.9	26.9	4.0	5.1	2.1	2.4	0.1	32.7

□ 수돗물 사업 평가(‘그렇다’ 비율)

원수 및 정수시설 관리를 잘한다	수돗물의 품질 관리를 잘한다	수돗물 관련 다양한 서비스를 제공한다	수돗물 관련 정보 제공에 적극적이다	수돗물 검침 결과를 신뢰할 수 있다	직원들은 시민의 요구에 친절하게 응대한다	직원들은 시민의 불만사항에 신속하게 대처한다
52.4	50.6	28.1	25.7	50.8	35.1	33.6

□ 지자체 수돗물 서비스 만족도

매우 만족	약간 만족	보통	약간 불만족	매우 불만족	종합			평균 (점)
					만족	보통	불만족
9.3	46.2	38.7	5.3	0.5	55.5	38.7	5.8	3.58

□ 수돗물 만족도 향상을 위해 강화되어야 할 제도 및 정책(1순위 기준)

노후된 수도관 교체	원수(상수원)의 수질관리	정수장 시설의 현대화/고도화	주택 내의 노후된 수도관(급수관) 교체 지원	주택 내의 노후된 저수조(물탱크) 교체 지원	주택 내 수질검사 지원 강화	실시간 수질 모니터링 및 정보공개	수도사고 예방대책 마련	수도요금의 인상	기타
33.9	28.4	9.5	13..0	4.2	7.9	1.8	1.0	0.3	0.0

17. 상수원수 지하수 수질검사 결과 (최근 3년간)

□ 검사개요

□ 대 상 : 상수도 공급을 위해 보유하고 있는 지하수

구 분	2022년	2023년	2024. 8월	비 고
검사대상 (개소)	382	382	381

□ 항목 및 주기 : 21개 항목 반기1회

□ 근거 :「수도법」제29조 및「상수원관리규칙」제25조

□ 지하수 수질검사 결과

□ 검사결과

구 분	2022년		2023년		2024년	비고
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
검사결과	적합	1개소 기준초과 그 외 적합	1개소 기준초과 그 외 적합	적합	적합

□ 상수원수 지하수 수질검사 공개 및 홍보

□ 상수원에서부터 수도꼭지까지 검사 결과 주기적 공개(홈페이지 등)

□ 하반기 검사계획

□ 상수원수 수질안전성 확보를 위한 검사추진 : '24. 9월 ~ 12월

18. 먹는물 및 지하수 수질검사 수수료 수입현황(최근 3년간)

□ 2022년

(단위 : 건, 천원)

구 분	합계	먹는물	지하수 (생활, 농어업 등)	전용상수도	수돗물 (저수조, 옥내급수관 등)	기타
건 수	1,118	8	297	35	778	-
수수료	43,626	84	11,725	5,360	26,457	-

□ 2023년

(단위 : 건, 천원)

구 분	합계	먹는물	지하수 (생활, 농어업등)	전용상수도	수돗물 (저수조, 옥내급수관 등)	기타
건 수	1,217	17	369	119	708	4
수수료	92,672	196	55,432	13,095	22,858	1,091

□ 2024. 8월

(단위 : 건, 천원)

구 분	합계	먹는물	지하수 (생활, 농어업 등)	전용상수도	수돗물 (저수조, 옥내급수관 등)	기타
건 수	468	15	17	32	403	1
수수료	19,559	158	4,012	2,943	12,431	15

19. 광역 및 지방상수도 시설 가동 현황(최근 3년간)

□ 1단계 시설사업

□ 사업기간 : 1996. 4월 ~ 2000. 11월

□ 사업내용 : 시설용량 120천톤/일(지하수 79공, 정수장 5개소, 가압장 4개소)

□ 가동현황

(단위 : 톤/일)

정수장명	시설 용량	ʼ22		ʼ23		ʼ24.8.		급수구역
		공급량	이용률	공급량	이용률	공급량	이용률
5개소	120,000	124,736	103.9	126,098	105.1	121,523	101.3
조 천	37,000	37,058	100.1	35,696	96.5	34,936	94.4	조천읍, 일도동, 이도동
애 월	23,000	26,800	116.5	26,598	115.6	23,954	104.1	연동, 노형, 애월읍 광령리
구 좌	19,000	16,125	84.8	17,604	92.7	17,519	92.2	구좌읍, 조천읍 함덕,대흘,선흘
남 원	37,000	38,976	105.3	40,129	108.5	39,622	107.1	남원읍, 표선면, 성산읍, 동․서홍동, 중앙동, 천지동
토 평	4,000	5,777	144.4	6,071	151.8	5,492	137.3	동․서홍동, 중앙동, 천지동 보충

□ 2단계 시설사업

□ 사업기간 : 2002. 11월 ~ 2008. 12월

□ 사업내용 : 시설용량 88천톤/일(지하수 62공, 정수장 4개소, 가압장 1개소)

□ 가동현황

(단위 : 톤/일)

정수장명	시설 용량	ʼ22		ʼ23		ʼ24.8.		급수구역
		공급량	이용률	공급량	이용률	공급량	이용률
4개소	88,000	93,668	106.4	89,287	101.5	80,512	91.5
유수암	32,000	32,856	102.6	27,455	85.8	24,902	77.8	애월읍, 노형,아라동
금 악	7,500	5,432	72.4	5,685	75.8	5,656	75.4	한림읍, 한경면
서 광	32,500	35,196	108.2	36,669	112.8	32,121	98.8	한림읍,대정읍,안덕면 일부
회 수	16,000	20,184	126.1	19,478	121.7	17,833	111.5	서귀포 동지역

20. 상수도 지하수 관정별 취수 현황(최근 3년간)

□ 총괄현황

(단위 : 천톤/월, %)

구 분	계			광역			지방			마을
	허가량	취수량	이용률	허가량	취수량	이용률	허가량	취수량	이용률	허가량	취수량	이용률
‘22.	16,349	11,030	67	9,600	6,869	72	1,147	726	63	5,602	3,435	61
‘23.	16,203	11,225	69	9,479	6,925	73	1,147	777	67	5,577	3,523	63
‘24	16,192	10,643	65	9,479	6,515	69	1,147	717	62	5,566	3,411	61

□ 2022년 광역(178호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2022		비 고
			취수량	이용률(%)
계		9,600,900	6,869,970	72
자굴이광역수원 1호공	D199920002	63,000	-	-
자굴이광역수원 2호공	D199920003	63,000	-	-
자굴이광역수원 3호공	D199920004	63,000	-	-
토평광역수원 1호공	D199920016	84,000	69,882	83
토평광역수원 2호공	D199920017	45,000	28,258	63
토평광역수원 3호공	D199820004	48,000	34,772	72
토평광역수원 4호공	D199820047	75,000	18,024	24
D-164(하원1)	Y199320016	21,600	9,415	44
행원1광역수원 1호공	D199630115	60,000	35,106	59
행원1광역수원 2호공	D199630116	60,000	34,140	57
행원1광역수원 3호공	D199630117	60,000	35,349	59
행원1광역수원 4호공	D199630118	60,000	35,717	60
행원1광역수원 5호공	D199630119	60,000	35,019	58
행원1광역수원 6호공	D199630120	60,000	35,427	59
행원2광역수원 1호공	D199630121	60,000	34,572	58
행원2광역수원 2호공	D199630122	60,000	34,568	58
행원2광역수원 3호공	D199630123	60,000	34,465	57
행원2광역수원 4호공	D199630124	60,000	35,415	59
행원2광역수원 5호공	D199630125	60,000	35,430	59
행원2광역수원 6호공	D199630126	60,000	35,768	60
구좌지구3호공	D199830016	30,000	28,834	96
구좌지구 1호공	W201610015	30,000	28,424	95
구좌지구 2호공	W201610016	30,000	26,675	89
금악광역수원 1호공	W200330036	48,000	36,931	77
금악광역수원 2호공	W200330037	48,000	41,849	87
금악광역수원 3호공	W200330038	48,000	20,117	42
금악광역수원 4호공	W200330039	48,000	33,380	70
금악광역수원 5호공	W200330040	48,000	38,502	80
금악광역수원 6호공	W200330041	45,000	41,843	93
남원정수장	D199840012	15,000	-	-
남원정1	W200920038	27,000	22,380	83
신흥2광역수원 1호공	D199640190	69,000	52,775	76
신흥2광역수원 2호공	D199640191	60,000	49,730	83
신흥2광역수원 3호공	D199640192	60,000	51,224	85
신흥2광역수원 4호공	D199640193	60,000	53,100	89
신흥2광역수원 5호공	D199640194	60,000	53,466	89
신흥2광역수원 6호공	D199640195	60,000	52,656	88
의귀2광역수원 1호공	D199640202	60,000	51,955	87
의귀2광역수원 2호공	D199640203	60,000	51,473	86
의귀2광역수원 3호공	D199640204	60,000	51,156	85
의귀2광역수원 4호공	D199640205	60,000	52,440	87
의귀2광역수원 5호공	D199640206	60,000	33,465	56
의귀2광역수원 6호공	D199640207	69,000	55,353	80
신흥1광역수원 1호공	D199640184	60,000	55,330	92
신흥1광역수원 2호공	D199640185	60,000	53,508	89
신흥1광역수원 3호공	D199640186	60,000	56,087	93
신흥1광역수원 4호공	D199640187	60,000	55,108	92
신흥1광역수원 5호공	D199640188	60,000	55,492	92
신흥1광역수원 6호공	D199640189	30,000	-	-
의귀1광역수원 1호공	D199640196	60,000	47,463	79
의귀1광역수원 2호공	D199640197	60,000	48,777	81
의귀1광역수원 3호공	D199640198	60,000	49,177	82
의귀1광역수원 4호공	D199640199	69,000	51,590	75
의귀1광역수원 5호공	D199640200	60,000	47,890	80
의귀1광역수원 6호공	D199640201	60,000	42,375	71
서광광역수원 1호공	W200340009	58,350	48,787	84
서광광역수원 2호공	W200340010	58,350	48,269	83
서광광역수원 3호공	W200340011	58,350	48,400	83
서광광역수원 4호공	W200340012	72,000	61,190	85
서광광역수원 5호공	W200340013	58,350	48,352	83
서광광역수원 6호공	W200340014	58,350	47,592	82
서광광역수원 7호공	W200340015	58,350	49,002	84
서광광역수원 8호공	W200340016	58,350	46,688	80
서광광역수원 9호공	W200340017	66,000	56,267	85
서광광역수원 10호공	W200340018	60,000	47,687	79
저지광역수원 1호공	W200330042	58,350	52,383	90
저지광역수원 2호공	W200330043	33,000	31	0
저지광역수원 3호공	W200330044	60,000	54,385	91
저지광역수원 4호공	W200330045	72,000	65,129	90
저지광역수원 5호공	W200330046	58,350	50,084	86
저지광역수원 6호공	W200330047	58,350	48,816	84
저지광역수원 7호공	W200330048	58,350	46,642	80
저지광역수원 8호공	W200330049	58,350	52,585	90
저지광역수원 9호공	W200330050	69,000	58,610	85
저지광역수원 10호공	W200330051	58,350	48,956	84
서광지구 1호공	W201620004	30,000	25,849	86
서광지구 2호공	W201620005	30,000	26,682	89
서광지구 3호공	W201620006	30,000	27,344	91
서광지구 4호공	W201920012	30,000	10,224	34
서광지구 5호공	W201920013	30,000	11,194	37
서광지구 6호공	W201920009	30,000	19,898	66
서광지구 7호공	W201920010	30,000	19,854	66
서광지구 8호공	W201920011	30,000	20,125	67
애월정수장3호공	w201310001	30,000	24,810	83
애월정수장1호공	W201410027	36,000	31,875	89
애월정수장2호공	W201410028	39,000	33,123	85
애월정수장4호공	D199830018	15,000	2,546	17
상귀(D-136)	Y199330125	34,350	-	-
D-231(소길)	Y199330397	27,000	-	-
상귀광역수원 1호공	D199630097	90,000	81,932	91
상귀광역수원 2호공	D199630098	87,000	78,526	90
상귀광역수원 3호공	D199630099	87,000	78,273	90
상귀광역수원 4호공	D199630100	75,000	58,381	78
상귀광역수원 5호공	D199630101	90,000	78,721	87
상귀광역수원 6호공	D199630102	84,000	74,415	89
D-239(외도2)	Y199310638	15,000	-	-
외도광역수원 1호공	D199610023	90,000	78,153	87
외도광역수원 2호공	D199610024	15,000	-	-
외도광역수원 3호공	D199610025	78,000	73,954	95
외도광역수원 5호공	D199610027	96,000	87,265	91
외도광역수원 6호공	D199610028	57,000	52,296	92
납읍광역수원 1호공	W200330030	54,000	40,684	75
납읍광역수원 2호공	W200330031	65,700	43,014	65
납읍광역수원 3호공	W200330032	60,000	53,508	89
납읍광역수원 4호공	W200330033	63,000	53,903	86
납읍광역수원 5호공	W200330034	54,000	44,795	83
납읍광역수원 6호공	W200330035	54,000	48,190	89
상가광역수원 1호공	W200330024	63,000	59,473	94
상가광역수원 2호공	W200330025	60,000	39,214	65
상가광역수원 3호공	W200330026	60,000	35,134	59
상가광역수원 4호공	W200330027	69,000	40,145	58
상가광역수원 5호공	W200330028	60,000	46,338	77
상가광역수원 6호공	W200330029	60,000	56,470	94
어음광역수원 1호공	W200530036	51,000	46,932	92
어음광역수원 2호공	W200530037	48,900	18,782	38
어음광역수원 3호공	W200530038	42,000	39,689	94
어음광역수원 4호공	W200530039	41,400	30,509	74
어음광역수원 5호공	W200610019	36,000	25,957	72
어음광역수원 6호공	W200610020	42,000	29,200	70
유수암광역수원 1호공	W200330018	60,000	36,531	61
유수암광역수원 2호공	W200330019	63,900	45,475	71
유수암광역수원 3호공	W200330020	60,000	37,916	63
유수암광역수원 4호공	W200330021	66,000	59,145	90
유수암광역수원 5호공	W200330022	63,600	53,532	84
유수암광역수원 6호공	W200330023	60,000	49,953	83
용강 1호공	W201510003	18,000	20,574	114
용강 2호공	W201510001	21,000	19,429	93
용강 3호공	W201510002	21,000	19,665	94
어승생 대체취수원 1호공	W201710021	15,000	-	-
어승생지구 1호공	W201610003	15,000	7,352	49
어승생지구 2호공	W201610004	15,000	7,044	47
조천지구 4호공	W200910015	30,000	-	-
삼양광역수원 1호공	D199610029	90,000	38,232	42
삼양광역수원 2호공	D199610030	81,000	45,400	56
삼양광역수원 3호공	D199610031	75,000	37,655	50
삼양광역수원 4호공	D199610032	75,000	54,784	73
삼양광역수원 5호공	D199610033	75,000	61,681	82
회천광역수원 1호공	D199610034	95,400	62,099	65
회천광역수원 2호공	D199610035	75,000	54,847	73
회천광역수원 3호공	D199610036	75,000	53,622	71
회천광역수원 4호공	D199610037	75,000	55,445	74
회천광역수원 5호공	D199610038	75,000	58,179	78
함덕광역수원 1호공	D199630103	38,700	-	-
함덕광역수원 2호공	D199630104	80,400	57,757	72
함덕광역수원 3호공	D199630105	76,800	56,819	74
함덕광역수원 4호공	D199630106	60,000	58,239	97
함덕광역수원 5호공	D199630107	74,700	57,088	76
함덕광역수원 6호공	D199630108	89,700	66,606	74
선흘광역수원 1호공	D199630109	74,100	53,348	72
선흘광역수원 2호공	D199630110	77,400	57,187	74
선흘광역수원 3호공	D199630111	72,000	51,703	72
선흘광역수원 4호공	D199630112	60,000	43,767	73
선흘광역수원 5호공	D199630113	60,000	48,392	81
선흘광역수원 6호공	D199630114	72,000	55,199	77
대포지구 1호공	W201520004	30,000	26,747	89
대포지구 2호공	W201520005	30,000	23,027	77
대포지구 3호공	W201520006	30,000	25,679	86
대포지구 4호공	W201520007	33,000	28,068	85
회수광역수원 1호공	W200320002	48,000	32,287	67
회수광역수원 2호공	W200320003	63,000	50,629	80
회수광역수원 3호공	W200320004	63,000	43,593	69
회수광역수원 4호공	W200320005	48,000	4,887	10
회수광역수원 5호공	W200320006	48,000	12,084	25
회수광역수원 6호공	W200320007	48,000	23,466	49
회수 1호공(법정사)	W200820013	30,000	24,719	82
회수 3호공(위호텔)	W200820012	45,000	39,487	88
상예광역수원 1호공	W200320008	16,500	-	-
상예광역수원 2호공	W200320009	60,000	46,584	78
상예광역수원 3호공	W200320010	31,200	-	-
상예광역수원 4호공	W200320011	60,000	15,978	27
상예광역수원 5호공	W200320012	60,000	49,376	82
상예광역수원 6호공	W200320013	45,000	40,275	90
상천지구 1호공	W201820007	30,000	21,568	72
상천지구 2호공	W201820008	30,000	26,012	87
상천지구 3호공	W201820009	30,000	25,911	86
상천지구 4호공	W201820010	30,000	25,844	86
저지지구 1호공	W201810038	30,000	-	-
저지지구 2호공	W201810039	30,000	-	-

□ 2022년 지방(20호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2022		비 고
			취수량	이용률(%)
계		1,147,500	726,484	63
96도련1(도련5호)	D199710005	45,000	39,555	88
96도련2(도련4호)	D199710006	54,000	50,170	93
96도련3(도련3호)	D199710007	54,900	51,257	93
도련지구 1호공	W201610007	63,000	55,933	89
도련지구 2호공	W201610008	69,600	59,063	85
D-105(오라3)	Y199310619	54,600	27,039	50
93오라6(오라6)	Y199510086	51,000	23,615	46
D-091(오라1)	Y199310613	60,000	30,363	51
오라4호 78-1	Y199310628	86,700	42,230	49
오라 5호 78-2	Y199310625	59,700	32,120	54
오라지구1호공	W201610011	30,000	18,595	62
93월산1(월산16호)	Y199510082	49,200	40,692	83
월산12호 78-5	Y199310621	51,900	46,225	89
D-176(월산4)	Y199310652	57,000	48,475	85
월산14호 79-1	Y199310614	67,500	48,388	72
월산15호 79-2	Y199310641	74,700	57,618	77
D-071-1(월산1호)	Y199310642	61,200	55,146	90
금산수원 1호공	W201810001	52,500	-	-
금산수원 2호공	W201810002	52,500	-	-
금산수원 3호공	W201810003	52,500	-	-

□ 2022년 마을(190호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2022		비 고
			취수량	이용률(%)
계		5,602,910	3,435,676	61
D-240(용흥가압장)	Y199320834	33,000	31,312	95
F-015(도순)	Y199320018	36,000	3,824	11
D-262(서홍2)	Y199520080	15,000	2,276	15
D-177(상효)	Y199320019	30,000	18,531	62
F-036(웃법호촌)	Y199320021	21,600	5,852	27
D-205(색달2)	Y199320022	28,800	19,230	67
D-039(색달1)	Y199320013	28,800	17,986	62
D-215(서홍1)	Y199320024	18,000	2,744	15
F-040(중문)	Y199320025	24,000	5,894	25
96-1(신효)	D199520021	36,000	34,698	96
D-125(토평)	Y199320008	36,000	26,945	75
D-187(동흥)	Y199320023	21,600	10,610	49
토평공업단지 97-1	D199720001	54,000	36,387	67
D-241(하원2)	Y199320835	18,000	16,858	94
D-217(호근2)	Y199320020	18,000	1,210	7
청암영상테마파크	W200810021	2,450	-	-
D-265(덕천)	Y199530140	27,000	14,917	55
D-295(상도1)	D199530040	30,000	25,257	84
D-296(상도2)	D199530041	33,000	26,417	80
F-511(송당)	W200330063	36,000	15,842	44
D-324(송당)	D199730122	24,000	11,838	49
D-012(한동)	Y199330136	51,000	39,312	77
F-070(한동2)	Y199530147	45,000	33,815	75
송당지구 1호공	W201710005	30,000	14,269	48
송당지구 2호공	W201710006	15,000	-	-
대흘 D-243	Y199330405	13,500	-	-
F-026(남원3)(위미3)	Y199340985	21,600	11,797	55
D-143(남원1)(진은교)	Y199341074	22,500	-	-
D-053(남원2)(남원1)	Y199341068	22,500	-	-
D-024(하례2)	Y199341067	39,000	13,364	34
89수망(수망)	Y199341077	30,000	14,649	49
D-222(신례2)	Y199341079	36,000	31,911	89
D-084(신례1)(공천포)	Y199341072	66,000	13,963	21
D-325(대성동2)	D199640181	30,000	12,475	42
D-022(위미2-2)	Y199341063	18,000	-	-
90상위미(상위미)	Y199341078	30,000	5,870	20
F-020(하례1)	Y199341076	24,000	-	-
남원(신흥)지구 1호공	W201520010	30,000	17,412	58
남원(신흥)지구 2호공	W201520011	45,000	22,081	49
남원(신흥)지구 3호공	W201520012	45,000	25,024	56
백통신원1호공	W201420015	30,000	2,093	7
백통신원2호공	W201420014	12,000	-	-
위미지구 2호공	W201320002	30,000	1,135	4
위미지구 1호공	W201320001	30,000	10,642	35
D-253(상도)	Y199330416	39,300	38,583	98
A-003(상도)	Y199330148	54,000	44,018	82
상도지구 1호공	W201810004	30,000	25,986	87
상도지구 2호공	W201810005	30,000	25,989	87
상도지구 3호공	W201710004	30,000	27,408	91
삼달신산지구 1호공	W201720005	30,000	17,982	60
성산지구 1호공	W201720001	30,000	26,445	88
성산지구 2호공	W201720002	30,000	19,535	65
성산지구 3호공	W201720003	30,000	16,870	56
성산지구 4호공	W201720004	30,000	16,822	56
D-326(한남)	D199640182	36,000	25,662	71
가시지구 1호공	W201920007	30,000	26,522	88
가시지구 2호공	W201920008	30,000	26,385	88
신산지구	W201520013	30,000	22,100	74
가파도지구 2호공(염)	W200540005	18,000	15,226	85
마라도(염)	W200340027	8,700	6,097	70
도련1호 D-013	Y199310632	63,000	58,465	93
영평지구 3호공	W201210008	45,000	42,284	94
영평지구 1호공	W201710009	30,000	24,280	81
영평지구 2호공	W201710010	30,000	25,774	86
98영평2(영평3호)	D199810014	52,800	49,107	93
도련2호 D-126	Y199310622	37,500	35,991	96
D-227(봉개2)	Y199310657	27,000	9,062	34
(봉개3호) D-317	D199610012	48,000	41,120	86
봉개지구 1호공	W201610009	30,000	23,215	77
봉개지구 2호공	W201610010	30,000	17,693	59
명도암지구	W201910016	30,000	22,615	75
D-285(명도암)	D199510025	26,400	5,627	21
D-260(용강)	Y199510084	21,000	16,020	76
동광지구1호공	W201320010	42,000	39,174	93
동광수원2호공	W201320011	30,000	29,024	97
영어도시수원1호공	W201220015	30,000	25,534	85
영어도시수원2호공	W201220016	30,000	25,471	85
영어도시수원3호공	W201220017	21,000	15,909	76
영어도시수원4호공	W201220018	30,000	26,427	88
영어도시수원5호공	W201220019	21,000	17,763	85
상창지구 2호공	W201520009	30,000	28,412	95
상창지구 1호공	W201520008	30,000	28,050	94
D-281(상창)	Y199540244	33,000	25,300	77
D-002(서광)	Y199341092	15,000	-	-
D-194(난산2)	Y199341083	45,000	18,930	42
W-009(삼달2)	Y199341080	16,500	-	-
D-258(삼달1)	Y199341050	45,000	43,885	98
91수산(수산4)	Y199341091	36,000	26,341	73
85화전2(화전)	Y199341089	39,000	-	-
89수산(수산3)	Y199341090	45,000	-	-
D-328(수산2)(시흥3)	D199640095	24,000	20,824	87
95수산(수산6)	D199540108	45,000	-	-
수산5지구(D-282)	Y199540247	45,000	35,489	79
D-257(난산3)	Y199341056	33,000	27,301	83
93목석원3(목석원3)	Y199510085	36,300	23,632	65
목석원2호 D-249	Y199310659	51,900	45,981	89
목석원1호 D-216	Y199310653	46,200	33,922	73
D-204(영평1)	Y199310646	41,400	37,660	91
94영평2호(영평2호)	Y199510088	35,700	19,213	54
D-286(월평)	D199510024	27,000	23,404	87
아라1호공	W201810019	30,000	22,160	74
아라2호공	W201810020	30,000	-	-
아라3호공	W201810021	30,000	15,805	53
아라4호공	W201810022	30,000	22,287	74
아라2지구 1호공	W201510013	37,200	34,367	92
아라2지구 2호공	W201510014	42,300	37,902	90
아라2지구 3호공	W201510015	38,400	33,430	87
F-296(광평)	D199740106	21,000	13,120	62
광평2	W200820009	21,000	8,393	40
사계지구(F-081)	Y200240037	42,300	17,966	42
89동광(서동광)	Y199341098	49,500	12,290	25
고성2지구(F-485)	W200230027	18,000	11,108	62
F-249(광령2)	D199730058	7,500	151	2
F-033(어도)	Y199330129	23,700	2,070	9
F-530(어음지구)	W200430010	18,000	15,607	87
F-486(유수암지구)	W200230028	18,000	14,899	83
광령지구 1호공	W201810032	15,000	-	-
광령지구 2호공	W201810033	30,000	2,300	8
D-133(오등)	Y199310627	15,000	-	-
D-272(고다시)	Y199510091	24,000	18,862	79
D-261(정실4호)	Y199510092	43,500	33,080	76
94오라(정실5호)	Y199510089	48,000	46,224	96
D-318(정실6)	D199610013	24,000	20,618	86
정실2호 84-1	Y199310654	44,700	42,378	95
D-135(정실1)	Y199310615	39,000	29,202	75
D-238(염통1)	Y199510081	55,800	43,781	78
염통2호 93-2	Y199310658	30,000	19,384	65
염통지구 1호공	W201610001	18,000	13,836	77
염통지구 2호공	W201610002	18,000	13,432	75
노형지구 1호공	W201610012	30,000	14,216	47
노형지구 2호공	W201610013	30,000	22,525	75
노형지구 3호공	W201610014	30,000	22,803	76
노형(노루생이) 1호공	W201810008	30,000	13,259	44
노형(노루생이) 2호공	W201810009	30,000	10,805	36
노형(노루생이) 3호공	W201810010	30,000	9,502	32
노형(노루생이) 4호공	W201810011	12,000	-	-
노형(노루생이) 5호공	W201910012	30,000	8,746	29
노형(노루생이) 6호공	W201910013	30,000	9,815	33
해안지구	W201910014	30,000	15,507	52
F-534(해안)	W200510003	21,000	19,363	92
F-535(해안)	W200510004	21,000	18,000	86
D-248(해안)	Y199310660	30,000	20,067	67
D-018(상가)	Y199330121	30,000	23,316	78
F-321(상가1)	D199830041	42,000	36,750	88
고성 D-212	Y199330128	28,500	20,919	73
하귀지구 1호공	W201710007	30,000	27,725	92
하귀지구 2호공	W201710008	30,000	26,372	88
교래지구F-264	D199730062	18,000	12,786	71
대흘 D-072	Y199330160	18,000	7	-
F-267(대흘2)	D199730075	36,000	4,837	13
F-268(선흘2)	D199730060	9,000	1	-
D-232(와산)	Y199330166	25,500	14,600	57
D-254(선인동)	Y199330415	18,000	5,828	32
S-018(와흘지구)	D200030081	12,000	175	1
F-071(와흘1)	Y199530148	12,060	3,861	32
애월지구 1호공	W201610017	11,250	-	-
애월지구 2호공	W201610018	22,500	20,864	93
애월지구 3호공	W201610019	22,500	16,306	72
애월지구 4호공	W201610020	22,500	15,875	71
어음1(애월복합)	W201510006	11,250	-	-
어음2(애월복합)	W201510007	22,500	14,829	66
어음3(애월복합)	W201510008	22,500	17,011	76
어음4(애월복합)	W201510009	22,500	16,299	72
어음지구 1호공	W201810035	30,000	20,054	67
어음지구 2호공	W201810036	30,000	20,173	67
어음지구 3호공	W201810037	30,000	19,317	64
교래지구 1호공	W201410018	24,000	19,866	83
교래지구 2호공	W201410019	24,000	17,711	74
교래(돌뱍물관) 1호공	W201710013	22,500	18,922	84
교래(돌뱍물관) 2호공	W201710014	22,500	20,012	89
교래(돌뱍물관) 3호공	W201710015	22,500	12,450	55
솔도지구 1호공	W201820005	21,000	23,785	113
솔도지구 2호공	W201820006	21,000	21,357	102
광령지구 3호공	W201810034	30,000	12,935	43
조천지구 1호공	W201810040	30,000	26,535	88
조천지구 2호공	W201810041	30,000	25,394	85
조천지구 3호공	W201810042	30,000	24,578	82
대흘지구 1호공	W201710011	30,000	21,768	73
대흘지구 2호공	W201710012	21,600	9,147	42
D-224(가시)	Y199341102	45,000	24,720	55
90성읍(성읍)	Y199341108	21,000	-	-
F-270(성읍2)	D199740105	21,000	11,498	55
D-037(세화)	Y199341105	45,000	-	-
F-178(토산)	D199640229	42,000	35,833	85
R-002(표선3)	D199740174	24,000	16,815	70
W-012(표선1)	Y199341101	41,400	25,186	61
F-032(하천1)	Y199341109	45,000	30,891	69
R-003(세화2)	D199740104	27,000	139	1
D-280(금악2)	Y200230018	11,400	-	-
D-230(금악1)	Y199330116	10,500	-	-

□ 2023년 광역(173호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2023		비 고
			취수량	이용률(%)
계		9,479,700	6,925,509	73
자굴이광역수원 1호공	D199920002	63,000	-	-
자굴이광역수원 2호공	D199920003	63,000	-	-
자굴이광역수원 3호공	D199920004	63,000	-	-
토평광역수원 1호공	D199920016	84,000	75,492	90
토평광역수원 2호공	D199920017	45,000	27,799	62
토평광역수원 3호공	D199820004	48,000	32,265	67
토평광역수원 4호공	D199820047	75,000	17,219	23
D-164(하원1)	Y199320016	21,600	12,227	57
행원1광역수원 1호공	D199630115	60,000	39,218	65
행원1광역수원 2호공	D199630116	60,000	40,331	67
행원1광역수원 3호공	D199630117	60,000	38,843	65
행원1광역수원 4호공	D199630118	60,000	38,485	64
행원1광역수원 5호공	D199630119	60,000	41,076	68
행원1광역수원 6호공	D199630120	60,000	38,608	64
행원2광역수원 1호공	D199630121	60,000	38,668	64
행원2광역수원 2호공	D199630122	60,000	38,497	64
행원2광역수원 3호공	D199630123	60,000	37,494	62
행원2광역수원 4호공	D199630124	60,000	38,353	64
행원2광역수원 5호공	D199630125	60,000	38,879	65
행원2광역수원 6호공	D199630126	60,000	39,849	66
구좌지구3호공	D199830016	30,000	28,071	94
구좌지구 1호공	W201610015	30,000	28,583	95
구좌지구 2호공	W201610016	30,000	26,705	89
금악광역수원 1호공	W200330036	48,000	36,565	76
금악광역수원 2호공	W200330037	48,000	40,753	85
금악광역수원 3호공	W200330038	48,000	34,912	73
금악광역수원 4호공	W200330039	48,000	39,645	83
금악광역수원 5호공	W200330040	48,000	37,844	79
금악광역수원 6호공	W200330041	45,000	36,221	80
남원정1	W200920038	27,000	23,223	86
신흥2광역수원 1호공	D199640190	69,000	59,565	86
신흥2광역수원 2호공	D199640191	60,000	53,967	90
신흥2광역수원 3호공	D199640192	60,000	54,743	91
신흥2광역수원 4호공	D199640193	60,000	54,635	91
신흥2광역수원 5호공	D199640194	60,000	54,799	91
신흥2광역수원 6호공	D199640195	60,000	54,589	91
의귀2광역수원 1호공	D199640202	60,000	53,236	89
의귀2광역수원 2호공	D199640203	60,000	53,562	89
의귀2광역수원 3호공	D199640204	60,000	54,492	91
의귀2광역수원 4호공	D199640205	60,000	54,438	91
의귀2광역수원 5호공	D199640206	60,000	53,584	89
의귀2광역수원 6호공	D199640207	69,000	60,954	88
신흥1광역수원 1호공	D199640184	60,000	54,472	91
신흥1광역수원 2호공	D199640185	60,000	53,739	90
신흥1광역수원 3호공	D199640186	60,000	54,724	91
신흥1광역수원 4호공	D199640187	60,000	54,752	91
신흥1광역수원 5호공	D199640188	60,000	54,493	91
신흥1광역수원 6호공	D199640189	30,000	-	-
의귀1광역수원 1호공	D199640196	60,000	49,483	82
의귀1광역수원 2호공	D199640197	60,000	50,527	84
의귀1광역수원 3호공	D199640198	60,000	51,934	87
의귀1광역수원 4호공	D199640199	69,000	57,928	84
의귀1광역수원 5호공	D199640200	60,000	51,663	86
의귀1광역수원 6호공	D199640201	60,000	48,866	81
서광광역수원 1호공	W200340009	58,350	51,013	87
서광광역수원 2호공	W200340010	58,350	52,507	90
서광광역수원 3호공	W200340011	58,350	51,173	88
서광광역수원 4호공	W200340012	72,000	64,139	89
서광광역수원 5호공	W200340013	58,350	48,819	84
서광광역수원 6호공	W200340014	58,350	53,593	92
서광광역수원 7호공	W200340015	58,350	50,414	86
서광광역수원 8호공	W200340016	58,350	48,474	83
서광광역수원 9호공	W200340017	66,000	47,930	73
서광광역수원 10호공	W200340018	60,000	52,649	88
저지광역수원 1호공	W200330042	58,350	52,542	90
저지광역수원 2호공	W200330043	33,000	-	-
저지광역수원 3호공	W200330044	60,000	52,931	88
저지광역수원 4호공	W200330045	72,000	64,482	90
저지광역수원 5호공	W200330046	58,350	53,867	92
저지광역수원 6호공	W200330047	58,350	47,999	82
저지광역수원 7호공	W200330048	58,350	52,471	90
저지광역수원 8호공	W200330049	58,350	51,827	89
저지광역수원 9호공	W200330050	69,000	62,341	90
저지광역수원 10호공	W200330051	58,350	54,162	93
서광지구 1호공	W201620004	30,000	29,391	98
서광지구 2호공	W201620005	30,000	28,742	96
서광지구 3호공	W201620006	30,000	28,665	96
서광지구 4호공	W201920012	30,000	7,147	24
서광지구 5호공	W201920013	30,000	20,179	67
서광지구 6호공	W201920009	30,000	29,280	98
서광지구 7호공	W201920010	30,000	29,294	98
서광지구 8호공	W201920011	30,000	29,203	97
애월정수장3호공	w201310001	30,000	24,881	83
애월정수장1호공	W201410027	36,000	31,819	88
애월정수장2호공	W201410028	39,000	34,562	89
애월정수장4호공	D199830018	15,000	14,013	93
상귀(D-136)	Y199330125	34,350	-	-
D-231(소길)	Y199330397	27,000	-	-
상귀광역수원 1호공	D199630097	90,000	80,983	90
상귀광역수원 2호공	D199630098	87,000	74,949	86
상귀광역수원 3호공	D199630099	87,000	78,463	90
상귀광역수원 4호공	D199630100	75,000	59,205	79
상귀광역수원 5호공	D199630101	90,000	69,542	77
상귀광역수원 6호공	D199630102	84,000	74,893	89
D-239(외도2)	Y199310638	15,000	-	-
외도광역수원 1호공	D199610023	90,000	80,061	89
외도광역수원 2호공	D199610024	15,000	-	-
외도광역수원 3호공	D199610025	78,000	73,113	94
외도광역수원 5호공	D199610027	96,000	87,465	91
외도광역수원 6호공	D199610028	57,000	50,005	88
납읍광역수원 1호공	W200330030	54,000	33,296	62
납읍광역수원 2호공	W200330031	65,700	36,413	55
납읍광역수원 3호공	W200330032	60,000	40,336	67
납읍광역수원 4호공	W200330033	63,000	51,870	82
납읍광역수원 5호공	W200330034	54,000	44,662	83
납읍광역수원 6호공	W200330035	54,000	37,223	69
상가광역수원 1호공	W200330024	63,000	26,724	42
상가광역수원 2호공	W200330025	60,000	35,783	60
상가광역수원 3호공	W200330026	60,000	33,629	56
상가광역수원 4호공	W200330027	69,000	41,732	60
상가광역수원 5호공	W200330028	60,000	48,095	80
상가광역수원 6호공	W200330029	60,000	40,733	68
어음광역수원 1호공	W200530036	51,000	31,862	62
어음광역수원 2호공	W200530037	48,900	43,719	89
어음광역수원 3호공	W200530038	42,000	39,009	93
어음광역수원 4호공	W200530039	41,400	25,017	60
어음광역수원 5호공	W200610019	36,000	25,571	71
어음광역수원 6호공	W200610020	42,000	22,046	52
유수암광역수원 1호공	W200330018	60,000	31,390	52
유수암광역수원 2호공	W200330019	63,900	31,531	49
유수암광역수원 3호공	W200330020	60,000	36,841	61
유수암광역수원 4호공	W200330021	66,000	55,960	85
유수암광역수원 5호공	W200330022	63,600	55,458	87
유수암광역수원 6호공	W200330023	60,000	46,026	77
용강 1호공	W201510003	18,000	20,671	115
용강 2호공	W201510001	21,000	21,446	102
용강 3호공	W201510002	21,000	19,273	92
어승생지구 1호공	W201610003	15,000	6,040	40
어승생지구 2호공	W201610004	15,000	7,727	52
조천지구 4호공	W200910015	30,000	-	-
삼양광역수원 1호공	D199610029	90,000	36,436	40
삼양광역수원 2호공	D199610030	81,000	48,668	60
삼양광역수원 3호공	D199610031	75,000	36,300	48
삼양광역수원 4호공	D199610032	75,000	56,378	75
삼양광역수원 5호공	D199610033	75,000	58,106	77
회천광역수원 1호공	D199610034	95,400	56,735	59
회천광역수원 2호공	D199610035	75,000	54,209	72
회천광역수원 3호공	D199610036	75,000	54,142	72
회천광역수원 4호공	D199610037	75,000	56,894	76
회천광역수원 5호공	D199610038	75,000	56,383	75
함덕광역수원 1호공	D199630103	38,700	-	-
함덕광역수원 2호공	D199630104	80,400	54,429	68
함덕광역수원 3호공	D199630105	76,800	67,380	88
함덕광역수원 4호공	D199630106	60,000	54,385	91
함덕광역수원 5호공	D199630107	74,700	49,527	66
함덕광역수원 6호공	D199630108	89,700	56,155	63
선흘광역수원 1호공	D199630109	74,100	50,507	68
선흘광역수원 2호공	D199630110	77,400	56,016	72
선흘광역수원 3호공	D199630111	72,000	49,238	68
선흘광역수원 4호공	D199630112	60,000	39,640	66
선흘광역수원 5호공	D199630113	60,000	44,066	73
선흘광역수원 6호공	D199630114	72,000	50,215	70
대포지구 1호공	W201520004	30,000	25,509	85
대포지구 2호공	W201520005	30,000	22,424	75
대포지구 3호공	W201520006	30,000	21,496	72
대포지구 4호공	W201520007	33,000	25,384	77
회수광역수원 1호공	W200320002	48,000	32,025	67
회수광역수원 2호공	W200320003	63,000	49,266	78
회수광역수원 3호공	W200320004	63,000	39,398	63
회수광역수원 4호공	W200320005	48,000	8,845	18
회수광역수원 5호공	W200320006	48,000	17,423	36
회수광역수원 6호공	W200320007	48,000	22,084	46
회수 1호공(법정사)	W200820013	30,000	20,596	69
회수 3호공(위호텔)	W200820012	45,000	36,703	82
상예광역수원 1호공	W200320008	16,500	11,840	72
상예광역수원 2호공	W200320009	60,000	44,736	75
상예광역수원 4호공	W200320011	60,000	19,587	33
상예광역수원 5호공	W200320012	60,000	49,414	82
상예광역수원 6호공	W200320013	45,000	36,394	81
상천지구 1호공	W201820007	30,000	26,266	88
상천지구 2호공	W201820008	30,000	26,377	88
상천지구 3호공	W201820009	30,000	28,572	95
상천지구 4호공	W201820010	30,000	25,120	84

□ 2023년 지방(20호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2023		비 고
			취수량	이용률(%)
계		1,147,500	777,380	67
96도련1(도련5호)	D199710005	45,000	45,000	88
96도련2(도련4호)	D199710006	54,000	54,000	90
96도련3(도련3호)	D199710007	54,900	54,900	95
도련지구 1호공	W201610007	63,000	63,000	76
도련지구 2호공	W201610008	69,600	69,600	69
D-105(오라3)	Y199310619	54,600	54,600	75
93오라6(오라6)	Y199510086	51,000	51,000	70
D-091(오라1)	Y199310613	60,000	60,000	73
오라4호 78-1	Y199310628	86,700	86,700	69
오라 5호 78-2	Y199310625	59,700	59,700	76
오라지구1호공	W201610011	30,000	30,000	87
93월산1(월산16호)	Y199510082	49,200	49,200	83
월산12호 78-5	Y199310621	51,900	51,900	83
D-176(월산4)	Y199310652	57,000	57,000	85
월산14호 79-1	Y199310614	67,500	67,500	68
월산15호 79-2	Y199310641	74,700	74,700	75
D-071-1(월산1호)	Y199310642	61,200	61,200	90
금산수원 1호공	W201810001	52,500	52,500	-
금산수원 2호공	W201810002	52,500	52,500	-
금산수원 3호공	W201810003	52,500	52,500	-

□ 2023년 마을(189호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2023		비 고
			취수량	이용률(%)
계		5,577,410	3,523,970	63
D-240(용흥가압장)	Y199320834	33,000	28,668	87
F-015(도순)	Y199320018	36,000	6,355	18
D-262(서홍2)	Y199520080	15,000	2,182	15
D-177(상효)	Y199320019	30,000	12,220	41
F-036(웃법호촌)	Y199320021	21,600	6,338	29
D-205(색달2)	Y199320022	28,800	21,708	75
D-039(색달1)	Y199320013	28,800	16,454	57
D-215(서홍1)	Y199320024	18,000	3,698	21
F-040(중문)	Y199320025	24,000	7,365	31
96-1(신효)	D199520021	36,000	35,043	97
D-125(토평)	Y199320008	36,000	34,750	97
D-187(동흥)	Y199320023	21,600	10,554	49
토평공업단지 97-1	D199720001	54,000	39,193	73
D-241(하원2)	Y199320835	18,000	14,657	81
D-217(호근2)	Y199320020	18,000	8,309	46
청암영상테마파크	W200810021	2,450	-	-
D-265(덕천)	Y199530140	27,000	14,779	55
D-295(상도1)	D199530040	30,000	24,413	81
D-296(상도2)	D199530041	33,000	29,946	91
F-511(송당)	W200330063	36,000	18,725	52
D-324(송당)	D199730122	24,000	7,578	32
D-012(한동)	Y199330136	51,000	41,404	81
F-070(한동2)	Y199530147	45,000	35,802	80
송당지구 1호공	W201710005	30,000	18,625	62
송당지구 2호공	W201710006	15,000	-	-
대흘 D-243	Y199330405	13,500	-	-
F-026(남원3)(위미3)	Y199340985	21,600	13,889	64
D-143(남원1)(진은교)	Y199341074	22,500	1,130	5
D-053(남원2)(남원1)	Y199341068	22,500	-	-
D-024(하례2)	Y199341067	39,000	16,708	43
89수망(수망)	Y199341077	30,000	14,450	48
D-222(신례2)	Y199341079	36,000	30,871	86
D-084(신례1)(공천포)	Y199341072	66,000	14,796	22
D-325(대성동2)	D199640181	30,000	13,599	45
D-022(위미2-2)	Y199341063	18,000	-	-
90상위미(상위미)	Y199341078	30,000	6,692	22
F-020(하례1)	Y199341076	24,000	392	2
남원(신흥)지구 1호공	W201520010	30,000	4,933	16
남원(신흥)지구 2호공	W201520011	45,000	22,198	49
남원(신흥)지구 3호공	W201520012	45,000	28,593	64
백통신원1호공	W201420015	30,000	3	0
백통신원2호공	W201420014	12,000	9	0
위미지구 2호공	W201320002	30,000	327	1
위미지구 1호공	W201320001	30,000	12,389	41
D-253(상도)	Y199330416	39,300	36,713	93
A-003(상도)	Y199330148	54,000	37,333	69
상도지구 1호공	W201810004	30,000	25,106	84
상도지구 2호공	W201810005	30,000	26,132	87
상도지구 3호공	W201710004	30,000	24,121	80
삼달신산지구 1호공	W201720005	30,000	19,664	66
성산지구 1호공	W201720001	30,000	27,778	93
성산지구 2호공	W201720002	30,000	11,087	37
성산지구 3호공	W201720003	30,000	19,361	65
성산지구 4호공	W201720004	30,000	19,102	64
D-326(한남)	D199640182	36,000	24,397	68
가시지구 1호공	W201920007	30,000	28,087	94
가시지구 2호공	W201920008	30,000	27,793	93
신산지구	W201520013	30,000	20,588	69
가파도지구 2호공(염)	W200540005	18,000	12,498	69
마라도(염)	W200340027	8,700	4,417	51
도련1호 D-013	Y199310632	63,000	51,446	82
영평지구 3호공	W201210008	45,000	37,499	83
영평지구 1호공	W201710009	30,000	25,499	85
영평지구 2호공	W201710010	30,000	26,729	89
98영평2(영평3호)	D199810014	52,800	46,123	87
도련2호 D-126	Y199310622	37,500	35,665	95
D-227(봉개2)	Y199310657	27,000	6,526	24
(봉개3호) D-317	D199610012	48,000	40,660	85
봉개지구 1호공	W201610009	30,000	23,275	78
봉개지구 2호공	W201610010	30,000	14,709	49
명도암지구	W201910016	30,000	25,223	84
D-285(명도암)	D199510025	26,400	7,823	30
D-260(용강)	Y199510084	21,000	20,977	100
동광지구1호공	W201320010	42,000	39,492	94
동광수원2호공	W201320011	30,000	29,058	97
영어도시수원1호공	W201220015	30,000	26,061	87
영어도시수원2호공	W201220016	30,000	25,719	86
영어도시수원3호공	W201220017	21,000	16,461	78
영어도시수원4호공	W201220018	30,000	26,099	87
영어도시수원5호공	W201220019	21,000	17,137	82
상창지구 2호공	W201520009	30,000	34,234	114
상창지구 1호공	W201520008	30,000	34,133	114
D-281(상창)	Y199540244	33,000	32,608	99
D-002(서광)	Y199341092	15,000	-	-
D-194(난산2)	Y199341083	45,000	18,944	42
W-009(삼달2)	Y199341080	16,500	688	4
D-258(삼달1)	Y199341050	45,000	44,001	98
91수산(수산4)	Y199341091	36,000	25,057	70
85화전2(화전)	Y199341089	39,000	65	0
89수산(수산3)	Y199341090	45,000	7,445	17
D-328(수산2)(시흥3)	D199640095	24,000	19,013	79
95수산(수산6)	D199540108	45,000	3	0
수산5지구(D-282)	Y199540247	45,000	36,299	81
D-257(난산3)	Y199341056	33,000	31,964	97
93목석원3(목석원3)	Y199510085	36,300	26,409	73
목석원2호 D-249	Y199310659	51,900	45,664	88
목석원1호 D-216	Y199310653	46,200	34,902	76
D-204(영평1)	Y199310646	41,400	37,491	91
94영평2호(영평2호)	Y199510088	35,700	17,747	50
D-286(월평)	D199510024	27,000	22,440	83
아라1호공	W201810019	30,000	28,148	94
아라3호공	W201810021	30,000	17,357	58
아라4호공	W201810022	30,000	20,690	69
아라2지구 1호공	W201510013	37,200	33,693	91
아라2지구 2호공	W201510014	42,300	39,982	95
아라2지구 3호공	W201510015	38,400	34,559	90
F-296(광평)	D199740106	21,000	21,726	103
광평2	W200820009	21,000	7,328	35
사계지구(F-081)	Y200240037	42,300	17,902	42
89동광(서동광)	Y199341098	49,500	12,935	26
고성2지구(F-485)	W200230027	18,000	17,613	98
F-249(광령2)	D199730058	7,500	47	1
F-033(어도)	Y199330129	23,700	1,729	7
F-530(어음지구)	W200430010	18,000	13,281	74
F-486(유수암지구)	W200230028	18,000	12,635	70
광령지구 1호공	W201810032	15,000	14	0
광령지구 2호공	W201810033	30,000	13,898	46
D-272(고다시)	Y199510091	24,000	22,673	94
D-261(정실4호)	Y199510092	43,500	30,822	71
94오라(정실5호)	Y199510089	48,000	46,253	96
D-318(정실6)	D199610013	24,000	21,988	92
정실2호 84-1	Y199310654	44,700	32,289	72
D-135(정실1)	Y199310615	39,000	25,083	64
D-238(염통1)	Y199510081	55,800	36,304	65
염통2호 93-2	Y199310658	30,000	11,949	40
염통지구 1호공	W201610001	18,000	12,571	70
염통지구 2호공	W201610002	18,000	12,233	68
노형지구 1호공	W201610012	30,000	19,157	64
노형지구 2호공	W201610013	30,000	19,353	65
노형지구 3호공	W201610014	30,000	21,281	71
노형(노루생이) 1호공	W201810008	30,000	12,850	43
노형(노루생이) 2호공	W201810009	30,000	12,454	42
노형(노루생이) 3호공	W201810010	30,000	13,321	44
노형(노루생이) 4호공	W201810011	12,000	-	-
노형(노루생이) 5호공	W201910012	30,000	9,578	32
노형(노루생이) 6호공	W201910013	30,000	9,103	30
해안지구	W201910014	30,000	15,781	53
F-534(해안)	W200510003	21,000	19,651	94
F-535(해안)	W200510004	21,000	15,478	74
D-248(해안)	Y199310660	30,000	16,996	57
D-018(상가)	Y199330121	30,000	25,547	85
F-321(상가1)	D199830041	42,000	38,546	92
고성 D-212	Y199330128	28,500	16,466	58
하귀지구 1호공	W201710007	30,000	28,679	96
하귀지구 2호공	W201710008	30,000	28,437	95
교래지구F-264	D199730062	18,000	12,745	71
대흘 D-072	Y199330160	18,000	-	-
F-267(대흘2)	D199730075	36,000	8,079	22
F-268(선흘2)	D199730060	9,000	-	-
D-232(와산)	Y199330166	25,500	16,846	66
D-254(선인동)	Y199330415	18,000	14,188	79
S-018(와흘지구)	D200030081	12,000	2	-
F-071(와흘1)	Y199530148	12,060	6,558	54
애월지구 1호공	W201610017	11,250	-	-	'23. 12월 폐공
애월지구 2호공	W201610018	22,500	21,275	95
애월지구 3호공	W201610019	22,500	11,923	53
애월지구 4호공	W201610020	22,500	11,752	52
어음1(애월복합)	W201510006	11,250	13,861	123
어음2(애월복합)	W201510007	22,500	21,407	95
어음3(애월복합)	W201510008	22,500	22,405	100
어음4(애월복합)	W201510009	22,500	20,644	92
어음지구 1호공	W201810035	30,000	15,489	52
어음지구 2호공	W201810036	30,000	15,501	52
어음지구 3호공	W201810037	30,000	15,148	50
교래지구 1호공	W201410018	24,000	20,436	85
교래지구 2호공	W201410019	24,000	17,748	74
교래(돌뱍물관) 1호공	W201710013	22,500	25,017	111
교래(돌뱍물관) 2호공	W201710014	22,500	25,228	112
교래(돌뱍물관) 3호공	W201710015	22,500	15,695	70
솔도지구 1호공	W201820005	21,000	30,209	144
솔도지구 2호공	W201820006	21,000	21,191	101
광령지구 3호공	W201810034	30,000	12,403	41
조천지구 1호공	W201810040	30,000	21,083	70
조천지구 2호공	W201810041	30,000	25,872	86
조천지구 3호공	W201810042	30,000	24,748	82
대흘지구 1호공	W201710011	30,000	13,372	45
대흘지구 2호공	W201710012	21,600	16,593	77
D-224(가시)	Y199341102	45,000	25,970	58
90성읍(성읍)	Y199341108	21,000	-	-
F-270(성읍2)	D199740105	21,000	12,478	59
D-037(세화)	Y199341105	45,000	-	-
F-178(토산)	D199640229	42,000	35,907	85
R-002(표선3)	D199740174	24,000	21,593	90
표선지구	W202120013	41,400	25,504	62
F-032(하천1)	Y199341109	45,000	31,956	71
R-003(세화2)	D199740174	27,000	9,426	35
D-280(금악2)	Y200230018	11,400	24	-
D-230(금악1)	Y199330116	10,500	21	-
ES리조트	W201520001	19,500	83	-

□ 2024년 광역(173호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2024		비 고
			취수량	이용률(%)
계		9,479,700	6,515,238	69
자굴이광역수원 1호공	D199920002	63,000	-	-
자굴이광역수원 2호공	D199920003	63,000	-	-
자굴이광역수원 3호공	D199920004	63,000	-	-
토평광역수원 1호공	D199920016	84,000	68,152	81
토평광역수원 2호공	D199920017	45,000	23,731	53
토평광역수원 3호공	D199820004	48,000	39,905	83
토평광역수원 4호공	D199820047	75,000	11,336	15
D-164(하원1)	Y199320016	21,600	6,005	28
행원1광역수원 1호공	D199630115	60,000	39,879	66
행원1광역수원 2호공	D199630116	60,000	38,044	63
행원1광역수원 3호공	D199630117	60,000	37,295	62
행원1광역수원 4호공	D199630118	60,000	38,478	64
행원1광역수원 5호공	D199630119	60,000	38,483	64
행원1광역수원 6호공	D199630120	60,000	38,562	64
행원2광역수원 1호공	D199630121	60,000	37,426	62
행원2광역수원 2호공	D199630122	60,000	39,670	66
행원2광역수원 3호공	D199630123	60,000	32,894	55
행원2광역수원 4호공	D199630124	60,000	39,808	66
행원2광역수원 5호공	D199630125	60,000	39,411	66
행원2광역수원 6호공	D199630126	60,000	42,193	70
구좌지구3호공	D199830016	30,000	28,471	95
구좌지구 1호공	W201610015	30,000	28,077	94
구좌지구 2호공	W201610016	30,000	26,800	89
금악광역수원 1호공	W200330036	48,000	38,237	80
금악광역수원 2호공	W200330037	48,000	40,295	84
금악광역수원 3호공	W200330038	48,000	37,834	79
금악광역수원 4호공	W200330039	48,000	40,001	83
금악광역수원 5호공	W200330040	48,000	25,266	53
금악광역수원 6호공	W200330041	45,000	35,519	79
남원정1	W200920038	27,000	21,828	81
신흥2광역수원 1호공	D199640190	69,000	56,610	82
신흥2광역수원 2호공	D199640191	60,000	49,888	83
신흥2광역수원 3호공	D199640192	60,000	52,355	87
신흥2광역수원 4호공	D199640193	60,000	51,093	85
신흥2광역수원 5호공	D199640194	60,000	47,648	79
신흥2광역수원 6호공	D199640195	60,000	52,845	88
의귀2광역수원 1호공	D199640202	60,000	49,100	82
의귀2광역수원 2호공	D199640203	60,000	51,472	86
의귀2광역수원 3호공	D199640204	60,000	48,557	81
의귀2광역수원 4호공	D199640205	60,000	52,773	88
의귀2광역수원 5호공	D199640206	60,000	49,255	82
의귀2광역수원 6호공	D199640207	69,000	53,805	78
신흥1광역수원 1호공	D199640184	60,000	49,828	83
신흥1광역수원 2호공	D199640185	60,000	51,972	87
신흥1광역수원 3호공	D199640186	60,000	51,813	86
신흥1광역수원 4호공	D199640187	60,000	49,187	82
신흥1광역수원 5호공	D199640188	60,000	51,352	86
신흥1광역수원 6호공	D199640189	30,000	-	-
의귀1광역수원 1호공	D199640196	60,000	50,368	84
의귀1광역수원 2호공	D199640197	60,000	48,090	80
의귀1광역수원 3호공	D199640198	60,000	48,015	80
의귀1광역수원 4호공	D199640199	69,000	57,572	83
의귀1광역수원 5호공	D199640200	60,000	47,812	80
의귀1광역수원 6호공	D199640201	60,000	47,572	79
서광광역수원 1호공	W200340009	58,350	52,148	89
서광광역수원 2호공	W200340010	58,350	51,377	88
서광광역수원 3호공	W200340011	58,350	51,939	89
서광광역수원 4호공	W200340012	72,000	52,916	73
서광광역수원 5호공	W200340013	58,350	49,213	84
서광광역수원 6호공	W200340014	58,350	51,002	87
서광광역수원 7호공	W200340015	58,350	51,493	88
서광광역수원 8호공	W200340016	58,350	50,624	87
서광광역수원 9호공	W200340017	66,000	57,839	88
서광광역수원 10호공	W200340018	60,000	53,086	88
저지광역수원 1호공	W200330042	58,350	53,933	92
저지광역수원 2호공	W200330043	33,000	-	-
저지광역수원 3호공	W200330044	60,000	51,476	86
저지광역수원 4호공	W200330045	72,000	63,013	88
저지광역수원 5호공	W200330046	58,350	54,691	94
저지광역수원 6호공	W200330047	58,350	46,995	81
저지광역수원 7호공	W200330048	58,350	55,087	94
저지광역수원 8호공	W200330049	58,350	49,549	85
저지광역수원 9호공	W200330050	69,000	62,672	91
저지광역수원 10호공	W200330051	58,350	55,077	94
서광지구 1호공	W201620004	30,000	29,156	97
서광지구 2호공	W201620005	30,000	29,619	99
서광지구 3호공	W201620006	30,000	28,653	96
서광지구 4호공	W201920012	30,000	20,690	69
서광지구 5호공	W201920013	30,000	18,464	62
서광지구 6호공	W201920009	30,000	28,548	95
서광지구 7호공	W201920010	30,000	28,994	97
서광지구 8호공	W201920011	30,000	28,605	95
애월정수장3호공	w201310001	30,000	25,709	86
애월정수장1호공	W201410027	36,000	31,403	87
애월정수장2호공	W201410028	39,000	20,300	52
애월정수장4호공	D199830018	15,000	13,276	89
상귀(D-136)	Y199330125	34,350	-	-
D-231(소길)	Y199330397	27,000	-	-
상귀광역수원 1호공	D199630097	90,000	76,592	85
상귀광역수원 2호공	D199630098	87,000	72,417	83
상귀광역수원 3호공	D199630099	87,000	66,405	76
상귀광역수원 4호공	D199630100	75,000	57,410	77
상귀광역수원 5호공	D199630101	90,000	69,638	77
상귀광역수원 6호공	D199630102	84,000	64,855	77
D-239(외도2)	Y199310638	15,000	-	-
외도광역수원 1호공	D199610023	90,000	76,881	85
외도광역수원 2호공	D199610024	15,000	-	-
외도광역수원 3호공	D199610025	78,000	65,902	84
외도광역수원 5호공	D199610027	96,000	79,299	83
외도광역수원 6호공	D199610028	57,000	40,320	71
납읍광역수원 1호공	W200330030	54,000	6,805	13
납읍광역수원 2호공	W200330031	65,700	47,488	72
납읍광역수원 3호공	W200330032	60,000	52,597	88
납읍광역수원 4호공	W200330033	63,000	10,237	16
납읍광역수원 5호공	W200330034	54,000	43,276	80
납읍광역수원 6호공	W200330035	54,000	41,653	77
상가광역수원 1호공	W200330024	63,000	15,769	25
상가광역수원 2호공	W200330025	60,000	54,738	91
상가광역수원 3호공	W200330026	60,000	25,370	42
상가광역수원 4호공	W200330027	69,000	43,967	64
상가광역수원 5호공	W200330028	60,000	50,958	85
상가광역수원 6호공	W200330029	60,000	15,160	25
어음광역수원 1호공	W200530036	51,000	15,926	31
어음광역수원 2호공	W200530037	48,900	35,361	72
어음광역수원 3호공	W200530038	42,000	28,767	68
어음광역수원 4호공	W200530039	41,400	28,308	68
어음광역수원 5호공	W200610019	36,000	15,037	42
어음광역수원 6호공	W200610020	42,000	21,578	51
유수암광역수원 1호공	W200330018	60,000	11,760	20
유수암광역수원 2호공	W200330019	63,900	33,485	52
유수암광역수원 3호공	W200330020	60,000	24,635	41
유수암광역수원 4호공	W200330021	66,000	35,957	54
유수암광역수원 5호공	W200330022	63,600	30,404	48
유수암광역수원 6호공	W200330023	60,000	43,997	73
용강 1호공	W201510003	18,000	17,989	100
용강 2호공	W201510001	21,000	22,379	107
용강 3호공	W201510002	21,000	19,261	92
어승생지구 1호공	W201610003	15,000	1,339	9
어승생지구 2호공	W201610004	15,000	1,318	9
조천지구 4호공	W200910015	30,000	-	-
삼양광역수원 1호공	D199610029	90,000	31,954	36
삼양광역수원 2호공	D199610030	81,000	61,220	76
삼양광역수원 3호공	D199610031	75,000	49,724	66
삼양광역수원 4호공	D199610032	75,000	52,815	70
삼양광역수원 5호공	D199610033	75,000	52,836	70
회천광역수원 1호공	D199610034	95,400	57,687	60
회천광역수원 2호공	D199610035	75,000	48,851	65
회천광역수원 3호공	D199610036	75,000	47,091	63
회천광역수원 4호공	D199610037	75,000	60,802	81
회천광역수원 5호공	D199610038	75,000	58,128	78
함덕광역수원 1호공	D199630103	38,700	-	-
함덕광역수원 2호공	D199630104	80,400	52,909	66
함덕광역수원 3호공	D199630105	76,800	55,048	72
함덕광역수원 4호공	D199630106	60,000	55,032	92
함덕광역수원 5호공	D199630107	74,700	48,809	65
함덕광역수원 6호공	D199630108	89,700	55,055	61
선흘광역수원 1호공	D199630109	74,100	49,473	67
선흘광역수원 2호공	D199630110	77,400	48,609	63
선흘광역수원 3호공	D199630111	72,000	47,435	66
선흘광역수원 4호공	D199630112	60,000	55,409	92
선흘광역수원 5호공	D199630113	60,000	38,654	64
선흘광역수원 6호공	D199630114	72,000	48,510	67
대포지구 1호공	W201520004	30,000	20,725	69
대포지구 2호공	W201520005	30,000	18,459	62
대포지구 3호공	W201520006	30,000	23,013	77
대포지구 4호공	W201520007	33,000	19,538	59
회수광역수원 1호공	W200320002	48,000	32,318	67
회수광역수원 2호공	W200320003	63,000	46,348	74
회수광역수원 3호공	W200320004	63,000	40,262	64
회수광역수원 4호공	W200320005	48,000	11,128	23
회수광역수원 5호공	W200320006	48,000	17,451	36
회수광역수원 6호공	W200320007	48,000	20,688	43
회수 1호공(법정사)	W200820013	30,000	15,857	53
회수 3호공(위호텔)	W200820012	45,000	28,493	63
상예광역수원 1호공	W200320008	16,500	14,921	90
상예광역수원 2호공	W200320009	60,000	45,849	76
상예광역수원 4호공	W200320011	60,000	19,563	33
상예광역수원 5호공	W200320012	60,000	48,773	81
상예광역수원 6호공	W200320013	45,000	32,991	73
상천지구 1호공	W201820007	30,000	24,374	81
상천지구 2호공	W201820008	30,000	23,111	77
상천지구 3호공	W201820009	30,000	25,528	85
상천지구 4호공	W201820010	30,000	24,430	81

□ 2024년 지방(20호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2024		비 고
			취수량	이용률(%)
계		1,147,500	717,504	62
96도련1(도련5호)	D199710005	45,000	39,882	89
96도련2(도련4호)	D199710006	54,000	40,192	74
96도련3(도련3호)	D199710007	54,900	51,522	94
도련지구 1호공	W201610007	63,000	36,273	58
도련지구 2호공	W201610008	69,600	34,770	50
D-105(오라3)	Y199310619	54,600	40,942	75
93오라6(오라6)	Y199510086	51,000	37,357	73
D-091(오라1)	Y199310613	60,000	45,569	76
오라4호 78-1	Y199310628	86,700	58,495	67
오라 5호 78-2	Y199310625	59,700	47,279	79
오라지구1호공	W201610011	30,000	26,268	88
93월산1(월산16호)	Y199510082	49,200	28,642	58
월산12호 78-5	Y199310621	51,900	36,765	71
D-176(월산4)	Y199310652	57,000	42,409	74
월산14호 79-1	Y199310614	67,500	39,556	59
월산15호 79-2	Y199310641	74,700	56,749	76
D-071-1(월산1호)	Y199310642	61,200	54,835	90
금산수원 1호공	W201810001	52,500	-	-
금산수원 2호공	W201810002	52,500	-	-
금산수원 3호공	W201810003	52,500	-	-

□ 2024년 마을(188호공)

(단위 : 톤/월)

지하수명	허가번호	허가량	2024		비 고
			취수량	이용률(%)
계		5,566,160	3,411,492	61
D-240(용흥가압장)	Y199320834	33,000	32,485	98
F-015(도순)	Y199320018	36,000	6,696	19
D-262(서홍2)	Y199520080	15,000	1,983	13
D-177(상효)	Y199320019	30,000	10,524	35
F-036(웃법호촌)	Y199320021	21,600	9,856	46
D-205(색달2)	Y199320022	28,800	21,281	74
D-039(색달1)	Y199320013	28,800	13,349	46
D-215(서홍1)	Y199320024	18,000	2,976	17
F-040(중문)	Y199320025	24,000	6,935	29
96-1(신효)	D199520021	36,000	35,229	98
D-125(토평)	Y199320008	36,000	36,453	101
D-187(동흥)	Y199320023	21,600	9,342	43
토평공업단지 97-1	D199720001	54,000	36,605	68
D-241(하원2)	Y199320835	18,000	7,420	41
D-217(호근2)	Y199320020	18,000	5,790	32
청암영상테마파크	W200810021	2,450	-	-
D-265(덕천)	Y199530140	27,000	21,373	79
D-295(상도1)	D199530040	30,000	19,691	66
D-296(상도2)	D199530041	33,000	27,662	84
F-511(송당)	W200330063	36,000	21,060	58
D-324(송당)	D199730122	24,000	21,966	92
D-012(한동)	Y199330136	51,000	46,415	91
F-070(한동2)	Y199530147	45,000	40,176	89
송당지구 1호공	W201710005	30,000	20,937	70
송당지구 2호공	W201710006	15,000	-	-
대흘 D-243	Y199330405	13,500	5,537	41
F-026(남원3)(위미3)	Y199340985	21,600	13,941	65
D-143(남원1)(진은교)	Y199341074	22,500	-	-
D-053(남원2)(남원1)	Y199341068	22,500	-	-
D-024(하례2)	Y199341067	39,000	18,295	47
D-024(하례2)	Y199341077	30,000	14,717	49
D-222(신례2)	Y199341079	36,000	26,920	75
D-084(신례1)(공천포)	Y199341072	66,000	15,952	24
D-325(대성동2)	D199640181	30,000	4,720	16
D-022(위미2-2)	Y199341063	18,000	-	-
90상위미(상위미)	Y199341078	30,000	6,814	23
F-020(하례1)	Y199341076	24,000	-	-
남원(신흥)지구 1호공	W201520010	30,000	14,372	48
남원(신흥)지구 2호공	W201520011	45,000	19,468	43
남원(신흥)지구 3호공	W201520012	45,000	23,068	51
백통신원1호공	W201420015	30,000	-	-
백통신원2호공	W201420014	12,000	-	-
위미지구 2호공	W201320002	30,000	-	-
위미지구 1호공	W201320001	30,000	13,508	45
D-253(상도)	Y199330416	39,300	20,825	53
A-003(상도)	Y199330148	54,000	36,625	68
상도지구 1호공	W201810004	30,000	28,165	94
상도지구 2호공	W201810005	30,000	26,198	87
상도지구 3호공	W201710004	30,000	24,537	82
삼달신산지구 1호공	W201720005	30,000	23,867	80
성산지구 1호공	W201720001	30,000	28,600	95
성산지구 2호공	W201720002	30,000	12,352	41
성산지구 3호공	W201720003	30,000	10,225	34
성산지구 4호공	W201720004	30,000	14,450	48
D-326(한남)	D199640182	36,000	21,723	60
가시지구 1호공	W201920007	30,000	27,317	91
가시지구 2호공	W201920008	30,000	27,118	90
신산지구	W201520013	30,000	20,225	67
가파도지구 2호공(염)	W200540005	18,000	13,566	75
마라도(염)	W200340027	8,700	3,981	46
도련1호 D-013	Y199310632	63,000	47,784	76
영평지구 3호공	W201210008	45,000	32,298	72
영평지구 1호공	W201710009	30,000	25,807	86
영평지구 2호공	W201710010	30,000	27,013	90
98영평2(영평3호)	D199810014	52,800	43,089	82
도련2호 D-126	Y199310622	37,500	35,033	93
D-227(봉개2)	Y199310657	27,000	19,118	71
(봉개3호) D-317	D199610012	48,000	34,290	71
봉개지구 1호공	W201610009	30,000	18,745	62
봉개지구 2호공	W201610010	30,000	20,455	68
명도암지구	W201910016	30,000	25,227	84
D-285(명도암)	D199510025	26,400	6,783	26
D-260(용강)	Y199510084	21,000	19,656	94
동광지구1호공	W201320010	42,000	39,419	94
동광수원2호공	W201320011	30,000	28,341	94
영어도시수원1호공	W201220015	30,000	25,054	84
영어도시수원2호공	W201220016	30,000	26,453	88
영어도시수원3호공	W201220017	21,000	18,441	88
영어도시수원4호공	W201220018	30,000	25,692	86
영어도시수원5호공	W201220019	21,000	18,170	87
상창지구 1호공	W201520008	30,000	28,912	96
상창지구 2호공	W201520009	30,000	28,646	95
D-281(상창)	Y199540244	33,000	31,105	94
D-002(서광)	Y199341092	15,000	-	-
D-194(난산2)	Y199341083	45,000	19,285	43
W-009(삼달2)	Y199341080	16,500	-	-
D-258(삼달1)	Y199341050	45,000	44,067	98
91수산(수산4)	Y199341091	36,000	12,188	34
85화전2(화전)	Y199341089	39,000	11,266	29
89수산(수산3)	Y199341090	45,000	21,790	48
D-328(수산2)(시흥3)	D199640095	24,000	18,565	77
95수산(수산6)	D199540108	45,000	334	1
수산5지구(D-282)	Y199540247	45,000	37,764	84
D-257(난산3)	Y199341056	33,000	33,187	101
93목석원3(목석원3)	Y199510085	36,300	33,262	92
목석원2호 D-249	Y199310659	51,900	45,957	89
목석원1호 D-216	Y199310653	46,200	42,485	92
D-204(영평1)	Y199310646	41,400	37,837	91
94영평2호(영평2호)	Y199510088	35,700	14,655	41
D-286(월평)	D199510024	27,000	23,752	88
아라1호공	W201810019	30,000	28,579	95
아라3호공	W201810021	30,000	17,875	60
아라4호공	W201810022	30,000	20,593	69
아라2지구 1호공	W201510013	37,200	33,118	89
아라2지구 2호공	W201510014	42,300	39,807	94
아라2지구 3호공	W201510015	38,400	35,648	93
F-296(광평)	D199740106	21,000	18,987	90
광평2	W200820009	21,000	2,195	10
사계지구(F-081)	Y200240037	42,300	16,035	38
89동광(서동광)	Y199341098	49,500	12,570	25
고성2지구(F-485)	W200230027	18,000	17,844	99
F-249(광령2)	D199730058	7,500	3	-
F-033(어도)	Y199330129	23,700	798	3
F-530(어음지구)	W200430010	18,000	12,844	71
F-486(유수암지구)	W200230028	18,000	19,740	110
광령지구 1호공	W201810032	15,000	-	-
광령지구 2호공	W201810033	30,000	-	-
D-272(고다시)	Y199510091	24,000	21,700	90
D-261(정실4호)	Y199510092	43,500	30,541	70
94오라(정실5호)	Y199510089	48,000	46,065	96
D-318(정실6)	D199610013	24,000	19,499	81
정실2호 84-1	Y199310654	44,700	28,151	63
D-135(정실1)	Y199310615	39,000	19,343	50
D-238(염통1)	Y199510081	55,800	46,905	84
염통2호 93-2	Y199310658	30,000	17,540	58
염통지구 1호공	W201610001	18,000	10,940	61
염통지구 2호공	W201610002	18,000	11,648	65
노형지구 1호공	W201610012	30,000	20,357	68
노형지구 2호공	W201610013	30,000	20,586	69
노형지구 3호공	W201610014	30,000	17,134	57
노형(노루생이) 1호공	W201810008	30,000	14,065	47
노형(노루생이) 2호공	W201810009	30,000	15,706	52
노형(노루생이) 3호공	W201810010	30,000	3,124	10
노형(노루생이) 4호공	W201810011	12,000	-	-
노형(노루생이) 5호공	W201910012	30,000	7,837	26
노형(노루생이) 6호공	W201910013	30,000	10,007	33
해안지구	W201910014	30,000	15,404	51
F-534(해안)	W200510003	21,000	18,017	86
F-535(해안)	W200510004	21,000	15,569	74
D-248(해안)	Y199310660	30,000	17,371	58
D-018(상가)	Y199330121	30,000	16,485	55
F-321(상가1)	D199830041	42,000	35,604	85
고성 D-212	Y199330128	28,500	21,308	75
하귀지구 1호공	W201710007	30,000	28,391	95
하귀지구 2호공	W201710008	30,000	26,920	90
교래지구F-264	D199730062	18,000	6,214	35
대흘 D-072	Y199330160	18,000	-	-
F-267(대흘2)	D199730075	36,000	3,766	10
F-268(선흘2)	D199730060	9,000	-	-
D-232(와산)	Y199330166	25,500	12,770	50
D-254(선인동)	Y199330415	18,000	13,095	73
S-018(와흘지구)	D200030081	12,000	-	-
F-071(와흘1)	Y199530148	12,060	6,948	58
애월지구 2호공	W201610018	22,500	11,722	52
애월지구 3호공	W201610019	22,500	11,298	50
애월지구 4호공	W201610020	22,500	10,619	47
어음1(애월복합)	W201510006	11,250	17,182	153
어음2(애월복합)	W201510007	22,500	21,093	94
어음3(애월복합)	W201510008	22,500	19,997	89
어음4(애월복합)	W201510009	22,500	19,943	89
어음지구 1호공	W201810035	30,000	12,062	40
어음지구 2호공	W201810036	30,000	13,148	44
어음지구 3호공	W201810037	30,000	11,969	40
교래지구 1호공	W201410018	24,000	23,030	96
교래지구 2호공	W201410019	24,000	17,702	74
교래(돌뱍물관) 1호공	W201710013	22,500	28,120	125
교래(돌뱍물관) 2호공	W201710014	22,500	14,757	66
교래(돌뱍물관) 3호공	W201710015	22,500	10,086	45
솔도지구 1호공	W201820005	21,000	25,935	123
솔도지구 2호공	W201820006	21,000	15,847	75
광령지구 3호공	W201810034	30,000	13,440	45
조천지구 1호공	W201810040	30,000	20,444	68
조천지구 2호공	W201810041	30,000	23,188	77
조천지구 3호공	W201810042	30,000	20,165	67
대흘지구 1호공	W201710011	30,000	12,345	41
대흘지구 2호공	W201710012	21,600	16,533	77
D-224(가시)	Y199341102	45,000	22,541	50
90성읍(성읍)	Y199341108	21,000	-	-
F-270(성읍2)	D199740105	21,000	12,361	59
D-037(세화)	Y199341105	45,000	-	-
F-178(토산)	D199640229	42,000	32,519	77
R-002(표선3)	D199740174	24,000	20,972	87
표선지구	W202120013	41,400	25,598	62
F-032(하천1)	Y199341109	45,000	28,372	63
R-003(세화2)	D199740104	27,000	2,851	11
D-280(금악2)	Y200230018	11,400	2	-
D-230(금악1)	Y199330116	10,500	1	-
ES리조트	W201520001	19,500	4,789	25

21. 상수도 배수지별 배수구역 및 배수가능량

지역별	관련정수장 및 가압장	배수지명	배수지 용량 (톤)	배수구역	배수 가능량 (톤/일)
	합 계		199,000		398,000
제주시 동지역	소 계		89,700		179,400
	월산정수장	월산	6,000	연동,노형,외도,이호동 등	12,000
	월산정수장	월산신	3,500	연동,노형,외도,이호동 등	7,000
	월산정수장	노형	6,000	노형, 드림타워	12,000
	유수암,애월정수장	염통	9,000	노형, 연동, 월산 등	18,000
	유수암, 오라정수장	민오름	6,300	용담, 삼도, 오라, 연동 등	12,600
	오라정수장	오라	5,000	용담, 삼도, 오라 등	10,000
	오라정수장	고다시	1,700	오등동(고다시마을)	3,400
	어승생,오라정수장	산천단	5,000	아라, 이도동 등	10,000
	유수암정수장	아라	4,000	아라, 월평, 이도동 등	8,000
	아라가압장	아라2	5,000	아라, 월평, 이도동	10,000
	조천,도련정수장	영평	9,000	일도동 등	18,000
	도련정수장	도련	6,000	삼양, 화북, 봉개동 등	12,000
	도련정수장	도련신	5,000	삼양, 화북, 봉개동 등	10,000
	도련정수장	명도암	3,000	봉개동	6,000
	별도봉정수장	사라봉	5,200	건입, 일도, 삼도 등	10,400
	별도봉정수장	사라봉신	1,000	건입, 일도, 삼도 등	2,000
	별도봉정수장	별도봉	9,000	화북, 일도, 건입 등	18,000
제주시 읍면 지역	소 계		57,600		115,200
	유수암정수장	광령(하귀)	2,000	애월읍	4,000
	유수암정수장	상가	3,000	애월읍(상가, 하가)	6,000
	애월정수장	애월	2,000	애월읍	4,000
	어승생정수장	어음	3,000	애월읍	6,000
	어승생정수장	교래	3,000	교래리, 어승생동부간선	6,000
	남원정수장	우도광역	4,000	우도면	8,000
	조천정수장	조천1	3,000	조천,신촌,와흘,대흘,함덕 등	6,000
	조천정수장	조천2	5,000	조천,신촌,와흘,대흘,함덕 등	10,000
	조천정수장	대흘(고평동)	2,000	조천읍(와흘, 대흘)	4,000
	한림,금악정수장	고지	4,000	한림, 애월, 한경 등	8,000
	한림,서광정수장	저지1	7,000	한림, 애월, 한경 등	14,000
		저지2	2,000		4,000
	구좌정수장	송당	2,000	구좌읍	4,000
	구좌정수장	한동	2,000	한동, 평대, 비자림	4,000
	구좌정수장	덕천	3,000	송당, 덕천, 김녕 등	6,000
	구좌정수장	함덕	2,000	함덕리	4,000
	구좌정수장	동김녕신	1,300	김녕리	2,600
	추자정수장	추자광역	5,300	추자면	10,600
	어승생정수장	어음신	1,000	애월읍, 한림읍, 안덕면	2,000
	어승생정수장	와산	1,000	선흘리	2,000
서귀포시 동지역	소 계		22,100		44,200
	강정,회수정수장	관광단지	1,000	관광단지, 상예, 하예 등	2,000
	강정정수장	공업단지	1,100	토평동	2,200
	강정,회수정수장	용흥	5,000	신시가지, 호근동 등	10,000
	강정,회수정수장	고근산	3,000	신시가지, 법환 등	6,000
	강정,회수정수장	삼매봉	5,000	서귀,보목,동홍,신효,하효 등	10,000
	남원,강정정수장	동홍	5,000	송산, 영천, 동홍 등	10,000
	강정정수장	헬스케어	2,000	동홍동(헬스케어타운),토평동	4,000
서귀포시 읍면 지역	소 계		29,600		59,200
	남원정수장	성산	1,000	성산, 오조, 고성, 수산1·2리	2,000
	남원정수장	표선	1,000	표선리, 세화1·2·3리, 가시리	2,000
	남원정수장	난산	1,000	신산, 난산, 온평	2,000
	남원정수장	남원	1,000	남원리	2,000
	남원정수장	신례	2,000	신례, 하례리	4,000
	남원정수장	수산	5,000	수산리	10,000
	서광정수장	영어교육도시	5,000	영어교육도시	10,000
	서광정수장	모슬봉	2,400	인성, 안성, 신도, 무릉 등	4,800
	서광정수장	안덕	1,000	안덕면	2,000
	서광정수장	대평	1,000	안덕면	2,000
	서광정수장	광평	1,000	안덕면	2,000
	서광정수장	광평가압장	1,000	안덕면	2,000
	서광정수장	광해악	1,900	안덕면	3,800
	서광정수장	가시악	4,300	상모, 하모, 동일, 일과 등	8,600
	남원정수장	표선신	1,000	표선면	2,000

22. 어승생 저수지 운영 및 관리 상황

□ 시설현황

구 분	1저수지	2저수지
저수지 용량	106,800톤	500,000톤
정수 시설량	15,000톤/일
급수구역	○ 급수구역 : 29개 마을(17,800명) - 동부지선(9개 마을) (제 주 시) : 노형, 아라, 월평, 회천, 교래, 선흘2리 송당, 상덕천 (서귀포시) : 성읍2 - 서부지선(20개 마을) (제 주 시) : 해안, 광령1,2, 고성2, 유수암, 장전, 소길, 상가, 납읍, : 어음1,2, 금악, 봉성, 상명, 저지 (서귀포시) : 광평, 동광, 상천, 상창, 서광서

□ 운영현황

□ 일평균 유입량

(단위 : 톤/일)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024	9,317	11,692	9,064	10,592	13,468	11,076	18,623	13,307	-	-	-	-
2023	8,345	7,507	6,468	9,684	17,097	15,081	29,279	23,977	15,010	10,130	10,027	9521
2022	7,675	6,108	12,268	12,306	8,791	11,255	13,048	19,411	22,760	10,133	8,391	7,116

□ 일평균 공급량

(단위 : 톤/일)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024	9,863	9,525	9,752	9,889	10,176	9,724	9,988	10,442	-	-	-	-
2023	8,634	7,999	8,257	9,133	9,041	8,891	9,773	11,082	11.295	10.916	10.042	10.072
2022	12,797	10,503	6,235	8,850	10,558	12,306	12,379	12,792	13,423	12,807	11,890	11,201

□ 관리상황

□ 근무인원 : 6명(일반직2. 청원경찰 1, 공무직 3)

□ 약품소독 : 소독약품 투입설비(차염발생설비 12㎏/일) 2대 운영

□ 수질관리 : 저수지 정기적 연2회 원수 수질검사

□ 수원관리 : 야산지에 위치한 Y계곡 특성상, 낙엽과 토석으로 인한 유입량 감소 시 지장물 제거 등 지속시행

23. 가뭄대비 물관리 대책 추진상황 및 향후계획

□ 현   황

❍ 상수도 공급량(‘24년) : 436,081톤/일 ※ 7~8월 평균 445,666톤/일

- 시설용량(512,552톤/일) 대비 85%, 2023년 434,216톤/일 대비 100.4%수준

□ 추진상황

❍ 비상급수 대책반 운영 : 4반 56명

- 비상급수 상황실 운영 : 2024. 6. 1. ~ 9. 30.(4개월간)

❍ 고도정수처리와 정수장 현대화로 안정적 용수 공급 기반 확충

- 조천·토평 정수장 고도정수처리(779억원 / '21.01.~'26.12.)

- 강정정수장 현대화사업(520억원 / '21.11. ~ '26.12.)

❍ 도서지역 담수화 시설 개량 및 증성과 해저 상수관로 확충

- 추자·마라·가파 담수화 시설 개량 및 확충(405억원 / '23.01.~'26.12.)

- 비양도 해저 상수관로 확충(106억원 / '24.01. ~ '26.12.)

❍ 농어촌 급수취약지역 시설 개선을 위한 사업추진

- 급수불량지역(읍·면) 14개 지구 L=19km, 58억 원투자

❍ 신규 취수원 개발과 상수도 시설 확충(’24년 12월까지)

- 지하수개발(신규 4공), 송수관로(L=3.6km)

❍ 일시적 급수 수요 발생지역 급수차 긴급 지원(8톤, 2대)

□ 향후계획

❍ 가뭄과 물수요 증가에 대비한 신규 취수원 개발과 급수 취약지역 정비

- 신규 취수원 개발(4공, 33억원), 읍․면 급수 취약지 정비(60억원)

❍ 안정적 상수도 생산․공급 시설 기반 마련

- 조천․토평 고도정수처리시설과 강정정수장 현대화 사업 완료(‘26년까지)

❍ 상수도 공급 대체 효과를 위한 유수율 제고사업 지속 추진

24. 급수불량지역 해소 추진 상황

□ 공급기반 확충

구 분	ʼ23년	ʼ24. 8.
친환경대체취수원개발사업	취수원개발 6공	취수원개발 4공
원인자부담사업	배수지 1개소 상수관로 10.9㎞	배수지 1개소 상수관로 3.8㎞
식수전용 저수지확충사업	배수지 2개소‧5,000㎥	송‧배수관로 L=3.6km

□ 상수관로 확장 및 신설사업

구 분		ʼ23년	ʼ24. 8.
합 계		L=15.31㎞	L=19.0㎞
사업량	제주시	・송배수관 확장 및 시설 L=10.86㎞	・송배수관 확장 및 시설 L=11.0㎞
	서귀포시	송배수관 확장 및 시설 L=4.45㎞	・송배수관 확장 및 시설 L=8.0㎞
합 계		5,858	5,858
사업비 (백만원)	제주시	3,937	3,000
	서귀포시	1,921	2,858
수혜지역	제주시	한림, 애월, 조천, 구좌, 한경, 우도	한림, 애월, 조천, 구좌, 우도
	서귀포시	대정, 남원, 성산, 표선	성산, 남원, 표선, 대정, 안덕

25. 추자도 고도 정수처리시설 및 해수담수화시설 운영상황

□ 일반현황

❍ 급수현황

(단위 : 가구, 명, 톤)

구 분 (ʼ24. 7.)	세대수	급수인구	1일 평균 급수량
			2021	2022	2023
추자면	975	1,871	1,151	1,050	817

❍ 시설현황

- (배 수 지) 5,300톤(3,000톤×1지, 1,500톤×1지, 400톤×2지)

- (정수시설) 해수담수시설 1,500톤/일, 빗물고도시설 1,000톤/일

- (수 원 지) 저수지(4개소, 172천톤), 복류수(2개소, 132천톤/년)

□ 급수 연혁

❍ (ʼ99. 이전) 월 1회 제한급수(저수지 4개소 172천톤, 빗물 및 우물 이용)

❍ (ʼ00.~ʼ12.) 월 3회 제한급수(해수담수화 1,000톤/일, 배수지 800톤)

❍ (ʼ13. 부터) 매일 급수 추진(해수담수화 1,500톤+빗물고도 1,000톤, 배수지 5,300톤)

□ 추진경위

❍ (ʼ04.) 환경부 도서지역 2단계(ʼ05~ʼ14년) 상수도 확충계획 반영

❍ (ʼ08.) 추자면 용수공급방안 타당성 조사 용역

❍ (ʼ09.) 제주특별자치도 수도정비기본계획 반영

□ 주요사업

❍ (ʼ98.~ʼ03.) 해수담수화 시설 사업(1,000톤/일, 4,567백만원)

❍ (ʼ10.~ʼ12.) 해수담수 증설(1,500톤/일), 빗물고도(1,000톤/일) 배수지 증설(2,300톤/일), 9,200백만원

❍ (ʼ14.~ʼ16.) 배수지 증설 3,000톤, 차수막 교체 20천㎡, 5,000백만원

❍ (ʼ19.~ʼ20.) 노후시설 개량(펌프1대, 정밀여과막 16EA, 소독설비 2대), 1,545백만원

❍ (ʼ21.) 해수담수전처리설비 증설·노후상수관로 개량, 2,346백만원

❍ (ʼ22.~ʼ26.) 해수담수화시설 개량(1,500톤/일) 및 증설(1,500톤/일)사업, 26,996백만원

- ’22. 05. 기본 및 실시설계용역 착수

- ’23. 11. 공사원가 사전검토, 건설기술심의 계약심의 등 행정절차 이행

- ’24. 06. 27 해수담수화시설 개량 및 증설사업 착공 (~‘26. 6. 26)

26. 상수도 유휴시설 정비사업 추진상황

□ 유휴시설 현황

용 도	시설명	주 소	시설용량	비고
용천수	금산수원	제주시 건입동 산지로5-16	18,500톤/일	예비수원 활용
용천수	자구리수원	서귀포시 서귀동 33	12,000톤/일	토평정수장 고도처리 시설 이후 활용
용천수	서림수원	서귀포시 대정읍 일과리 1293-1	15,000톤/일	가동중지(2008.3) 시설폐쇄(2012.8)
지하수	청암영상테마파크	제주시 구좌읍 김녕리 5160	163톤/일	향후 활용 검토

□ 추진 현황

❍ 금산수원지(시설용량 18.5천톤/일)

- ('17. 01.) 금산수원지 활용 및 수질개선 타당성 조사 시행

- ('19. 05.) 지하수 개발(3공) 완료

- ('20. 06.) 도수관로 공사 준공(D400, L=3,491m)

- ('21. 02.) 배수지증설공사 준공(1,000톤) 1지

❍ 자구리 수원(시설용량 12천톤/일)

- 토평정수장 고도정수처리 시설사업(’22~‘26.) 이후 수원 활용 계획

❍ 서림수원(시설용량 15천톤/일)

- 가동중지 및 수원지 생태복원사업(’16. 11월) 추진

□ 향후계획

❍ 향후 증가하는 용수 수요에 능동적으로 대처하기 위한 유휴시설 활용 방안 강구

('19. 1월부터) 일별 10,000 ~ 15,000톤 취수 처리중

27. 수원지 생태하천 복원사업 추진 실적

□ 추진방향

구분	추진방향	구분	추진방향
금산 수원지	∙제주 물 문화의 역사적인 기록을 보존하는 “물환경 생태관” 조성	외도 수원지	∙건전한 생태환경을 고려한 “생태 하천”조성 - 친환경 보, 어도 설치 - 수변식물 생태 복원
서림 수원지	∙도민들에게 문화, 여가, 휴식의 장소를 제공할 수 있는“문화공원”조성	삼양3 수원지	∙도민들에게 문화, 여가, 휴식의 장소를 제공할 수 있는“문화공원”조성

□ 사업 개요

□ 사 업 량 : 금산 수원지 생태복원 외 3개소

□ 사업기간 : ʼ10년 ~ ʼ15년(6년간)

□ 사 업 비 : 105억원(국비 74, 도비 31)

□ 사업내용 : 생태학습체험장 및 옛 물길 복원 등 문화공간 조성

□ 연차별 투자현황

(단위 : 백만원)

재원별	전체계획	ʼ14까지 실적	ʼ15~ʼ16시행	비 고
합 계	10,528	9,245	1,283
국 비	7,370	6,472	898
도 비	3,158	2,773	385

□ 추진 현황

□ ʼ13. 2월 : 금산수원지 생태복원사업 완료

□ ʼ14. 5월 : 외도수원지 생태복원사업 완료

□ ʼ14. 8월 : 삼양3수원지 생태복원사업 완료

□ ʼ16. 11월 : 서림수원지 생태복원사업 완료

□ ʼ17년~ : 생태환경 유지 향상을 위한 시설물 유지관리 등 사후관리

□ ʼ22년~ ʼ26년: 생태하천 복원사업 사후 모니터링 실시

□ 기대 효과

□ 수생태계 건강성 회복과 지역주민에게 쾌적한 생활환경 제공

□ 산지천 축제 및 예래 생태마을 체험축제 등 도내 지역 축제와 연계한 도민 및 관광객에게 친환경 체험공간과 문화서비스 제공

28. 취·정수장 시설별 법정 기술인력 및 확보현황

□ 정수장별 법정 전문인력 확보현황(ʼ24.8.31 기준)

대 상 정수장	시설용량 (톤/일)	운영 인원 (명)	배치기준(등급별)				배치내역(등급별)				비고
			계	1급	2급	3급	계	1급	2급	3급
계	343,500	64	48	8	15	25	25	0	7	18
조 천	37,000	4	4	1	1	2	3			3
구 좌	19,000	3	2		1	1	1			1
애 월	23,000	3	4	1	1	2	2		1	1
남 원	37,000	5	4	1	1	2	1			1
토 평	4,000	0	1			1					무인
월 산	24,000	6	4	1	1	2	2			2
오 라	15,000	4	2		1	1	1			1
별도봉	35,000	3	4	1	1	2	1		1
도 련	10,000	3	2		1	1	1			1
한 림	10,000	4	2		1	1	2		1	1
강 정	25,000	9	4	1	1	2	3		1	2
어승생	15,000	6	2		1	1	4		2	2
유수암	32,000	4	4	1	1	2	1			1
금 악	7,500	0	2		1	1					무인
서 광	32,500	4	4	1	1	2	2		1	1
회 수	16,000	3	2		1	1	1			1
추 자	1,500	3	1			1

- 현재 정수시설 운영 관리사는 배치기준 48명 중 25명(52%)이 배치되어 있으며 23명이 필요한 실정임.

□ 정수시설운영관리사 배치기준(수도법 시행령 제34조)

시설규모(일)	배치기준
	1급	2급	3급
5백㎥ 이상 5천㎥ 미만	-	-	1명 이상
5천㎥ 이상 2만㎥ 미만	-	1명 이상	1명 이상
2만㎥ 이상 5만 ㎥미만	1명 이상	1명 이상	2명 이상
5만㎥ 이상 10만 ㎥미만	1명 이상	2명 이상	3명 이상
10만㎥ 이상 50만㎥ 미만	1명 이상	3명 이상	4명 이상
50만㎥이상	2명 이상	3명 이상	5명 이상

29. 취수원 및 배수지 개발 현황(최근 3년간)

□ 취 수 원

개발연도	시 설 명	위 치	시설용량 (㎥/일)	비 고
2023년	3공		6,500
	교래지구(1호공)	조천읍 교래리 산 119	1,000
	교래지구(2호공)	조천읍 교래리 산 119	1,000
	교래지구(3호공)	조천읍 교래리 산 119	1,000
	교래지구(4호공)	조천읍 교래리 산 119	1,000
	하례지구	남원읍 하례리 산 64-26	1,300
	남원지구	남원읍 남원리 1975	1,200
2024년	4공		3,400
	교래지구(5호공)	조천읍 교래리 산 101-1	1,000
	교래지구(6호공)	조천읍 교래리 산 101-1	1,000
	광평지구(1호공)	안덕면 광평리 산 38	700
	광평지구(2호공)	안덕면 광평리 산 38	700

□ 배 수 지

개발연도	시 설 명	위 치	시설용량 (톤)	비 고
2022년	3건		3,700
	표선지구	표선면 가시리산 1-4번지	1,000	준공(23.02)
	고다시지구	오등동 919-2번지	1,700	준공(23.12)
	애월지구	애월읍 어음리 산 11-3	1,000	준공(23.12)
2023년 ~ 2024년	2건		5,000
	동홍지구	서귀포시 토평동 2286	4,000	착공(23.06.)
	와산지구	제주시 조천읍 교래리 140-1	1,000	착공(23.06.)

30. 상수도 고도처리시설사업 추진상황

□ 추진실적

사업명	사업기간	사업비	사업량
추자정수장 고도정수처리시설	'11.01.10.~'12.12.21.	9,200백만원	막여과RO 1.5천톤
한림정수장 고도정수처리시설	'13.04.11.~'16.10.12.	12,000백만원	막여과NF 10천톤
삼양3수원지 고도정수처리시설	'16.12.29.~'19.01.25.	13,799백만원	막여과RO 15천톤
한림정수장 고도정수처리시설(증설)	'19.01.01.~'22.12.27.	7,500백만원	막여과MF 4천톤
애월정수장 고도정수처리시설	'20.08.07.~'23.12.19.	19,174백만원	막여과MF 23천톤

□ 추진현황

❍ 공사중

시설명	신규/증설	시설용량 (㎥/일)	적용막	제거대상물질	취수원	준공예정	사업비
조천정수장	신규	37,000	MF+RO	질산성질소 외	지하수	2026. 12.	510억원
토평정수장	증설	12,400	MF	바이러스, 총대장균군	지하수	2025. 12.	267억원
강정정수장	신규	25,000	MF	바이러스, 총대장균군	강정천	2026. 12.	520억원
추자정수장	개량 1,500 증설 1,500	1,500	MF+RO	염분 외	해수	2026. 06.	269억원

❍ 설계중

구분	시설명	시설용량 (㎥/일)	적용막	제거대상물질	취수원	준공예정	사업비
정수장	가파담수장	개량 300 증설 300	RO	염분 외	염지하수	2026. 12.	100억원
	마라담수장	개량 100 증설 200	RO	염분 외	염지하수	2026. 12.	85억원

□ 향후계획

❍ (추자정수장) 해수담수화시설 개량 및 증설사업 추진(ʼ23. 11. ~ ʼ26. 06.)

❍ (강정정수장) 정수장 현대화사업 추진(ʼ23. 12. ~ ʼ26. 12.)

❍ (조천·토평정수장) 고도정수처리시설사업 추진(ʼ23. 11. ~ ʼ26. 12.)

❍ (가파·마라정수장) 해수담수화시설 개량 및 증설사업 추진(ʼ23. 06. ~ ʼ26. 12.)

31. 사유지에 시설된 상수도시설 현황

□ 사유지내 도송수관로 현황

구분	총연장(km)	사유지내 연장(km)	사유지 통과 비율(%)	비 고
계	580	8.8	1.5
도수관로	78	1	1.3
송수관로	502	7.8	1.5

※ 사유지 내 도송수관로 연장은 관망도상에서 개략 연장을 파악한 결과이며, 현황상 도로의 사유지는 포함되지 않음(총사업비 : 114억원(1km당 13억원)

□ 추진실적

❍ 사유지 매설 상수도관로 이설공사 추진현황 : 송수관로 L=6.253㎞, 4,577백만원

- 2019년도 : 강정동 상수도관로 이설공사(사업비 : 1,119백만원)

· 사업량 : 송수관로(D500mm) L=279m, 배수관로(D700mm) L=279m

- 2020년도 : 한림읍 대림리 상수관로 이설공사 외 4건(사업비 : 1,647백만원)

· 사업량 : 송·배수관로(D50~500mm) L=2,732m

- 2021년도 : 삼양동 상수관로 이설공사 외 1건(사업비 : 900백만원)

· 사업량 : 송·배수관로(D50~500mm) L=700m

- 2022년도 : 토평동 상수관로 이설공사(사업비 : 170백만원)

· 사업량 : 송수관로(D100mm) L=540m

- 2023년도 : 어승생정수장(서부간선) 송수관로 이설공사(사업비 : 741백만원)

· 사업량 : 송수관로(D300mm) L=2,053m

❍ 상수도관로 사유지 매입현황 : 10필지(면적 : 4,042㎡), 451백만원

- 서귀포시 강정동 1960-19번지 외 2필지(면적 : 576㎡) : 118백만원

- 제주시 도련일동 1156-1번지(면적 : 164㎡) : 143백만원

- 제주시 용강동 110-2번지 외 5필지(면적 : 3,323㎡) : 190백만원

□ 향후계획

❍ 사유지 통과 도·송수관로는 이설을 원칙으로 년차별로 예산범위에서 추진

❍ 단, 이설부지 확보 곤란, 대규모 예산 수반 등으로 이설보다 토지매입이 타당한 경우에는 도·송수관로 통과 사유지 매입 추진

32. 상수도 누수율 현황(최근 3년간)

(환경부 통계 기준, 단위 : %)

시․도별	ʼ20년		ʼ21년		ʼ22년
	유수율	누수율	유수율	누수율	유수율	누수율
제주특별자치도	48.8	41.3	51.8	43.1	53.3	42.4
서울특별시	95.5	2.0	95.7	1.8	95.9	1.6
부산광역시	92.9	3.3	91.5	4.7	92.0	4.2
대구광역시	92.8	3.8	92.8	3.8	94.0	2.4
인천광역시	88.1	8.8	90.3	6.2	90.6	5.9
광주광역시	90.2	5.2	90.4	5.7	90.4	5.6
대전광역시	95.1	1.7	95.2	1.5	94.6	2.4
울산광역시	87.5	8.5	87.3	8.7	88.2	7.4
세종특별자치시	93.4	6.6	91.3	6.2	88.3	9.2
경 기 도	89.3	6.5	89.2	6.6	89.1	6.7
강 원 도	72.9	20.4	72.9	21	73.8	20.7
충청북도	87.1	10.0	88	8.7	89	8.0
충청남도	81.8	14.6	81.1	16.3	82.5	15.0
전라북도	72.7	22.4	74.4	21	74.3	20.8
전라남도	72.6	22.9	72.1	21.6	73.8	19.8
경상북도	72.3	25.2	73	23.3	73.9	22.8
경상남도	76.6	17.7	77.3	17	77.2	17.3
전국평균	85.7	10.4	85.9	10.2	86.3	9.9

‣유수율 : 정수장 수돗물 생산량 중 요금수입으로 받아 들이는 수량의 비율

(요금이 부과된 수량/총급수량 × 100)

‣누수율 : 정수장 수돗물 생산량 중 노후 상수관로에서 누수되는 수량의 비율

(계량기 이전에 발생한 손실 수량 / 총급수량 × 100)

33. 유수율 제고 사업 추진상황

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2027년

❍ 유수율 목표 : 2027년까지 전국 평균의 수준 85%

(ʼ16년) 45.7% → (ʼ21년) 52% → (ʼ23년) 63% → (ʼ25년) 75% → (ʼ27년) 85%

❍ 사업내용 : 상수도 관망블록 378개소/ 노후상수관 정비 L=1,316㎞

❍ 소요예산 : 8,816억원(기투자 2,383, ʼ24년 625, 향후 5,808)

□ 추진상황

❍ 유수율 종합대책 수립(ʼ16.3월)

- (계획)상수관망 블록구축 332개소(실시설계 377), 노후 관로정비 725㎞ / 3,934억원

- (실적)상수관망 블록구축 154개소, 노후 관로정비 186.5㎞ / 1,417억원

❍ 유수율 재고 재정비 계획수립(ʼ22.8월)

- (계획)상수관망 블록구축 378개소, 노후 관로정비 1,316㎞ / 8,816억원

- (실적)상수관망 블록구축 224개소, 노후 관로정비 18.7㎞ / 966억원

※ 제주도 전지역 378개 블록 구축 완료(제주시 211개소, 서귀포시 167개소)

❍ 유수율 제고사업 투자실적 및 계획

(단위 : 억원)

사업명	합계	기투자	ʼ24년	향후	비고
합 계	5,598	2,120	508	2,970
읍·면지역(6개소) 유수율제고사업	1,027	1,027	-	-	ʼ16.1.~ʼ21.12.
동지역[제주시(동부), 서귀포시]	1,326	533	215	578	ʼ20.1.~ʼ26. 6.
제주시(서부) 현대화사업	698	542	156	-	ʼ20.6.~ʼ25. 6.
애월읍 노후상수관망 사업	250	18	68	164	ʼ23.1.~ʼ26.12.
구좌성산 노후상수관망 사업	460		69	391	ʼ24.1.~ʼ29.12.
2025년 노후상수관망 사업	1,837			1,837	ʼ25.1.~ʼ30.12.

【노후 상수관망 정비】 ʼ16년 ~ ʼ23년 – 220.4㎞, ʼ24년 추가 관망정비사업 추진(국비)

❍ ʼ22. 12. : 애월 노후상수관망 신규정비사업 국비반영(ʼ23. ~ ʼ25./250억)

❍ ʼ23. 12. : 구좌성산 노후상수관망 신규정비사업 국비반영(ʼ24. ~ ʼ29./460억)

❍ ʼ24. 08. : 2025년 노후상수관망 신규정비사업 국비반영(ʼ25. ~ ‘30./1,837억)

□ 향후계획

❍ 효율적 유수율 향상방안 연구용역을 통한 민선8기 성과창출 전략 수립

❍ 유수율 제고사업 지속 추진

34. 상수도관망최적관리시스템 구축사업 추진현황 및 계획

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 상수도관망 최적관리시스템 구축

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2027년

❍ 사 업 비 : 8,816억원(국비 3,087/ 도비 5,729)

❍ 사 업 량 : 도 전역 378개 블록(대블록17, 중블록116, 소블록245) 분할

❍ 사업내용 : 노후 상수관로정비 1,316㎞, 블록시스템 구축, 유지관리시스템 1식

	< 블록시스템 개념 >
급수구역을 일정규모로 분할, 『블록시스템』을 구축하여 블록내 수압, 수량, 수질을 감시․제어함으로써 최적의 관망 조건을 유지하여 유수율과 누수여부를 체계적이고 과학적으로 관리하는 시스템

※ 블록설정 기준 : 대블록(정수장), 중블록(배수지 또는 가압장), 소블록(유량계)

□ 추진실적

❍ ʼ16년 ~ ʼ17년 : 유수율 제고사업 시범사업 추진 완료(오라·애월·토평)

❍ ʼ22.8월 : 읍·면지역 상수관망 블록구축사업 완료

❍ 동지역(제주시 동부, 서귀포시) 상수도 유수율제고사업(ʼ20~ʼ26) : ʼ24까지 748억

❍ 제주시 동지역(서부) 지방상수도 현대화사업(ʼ20~ʼ25) : ʼ24까지 698억

※ 상수관망 블록구축 실적(`24. 8월 기준)

구 분	기본계획	실시설계			비고
		계	구축완료	구축 중
합 계	332	378	378	-
대블록	19	17	17	-
중블록	66	116	116	-
소블록	247	245	245	-

- 구축완료: (동 지 역) 제주시(122), 서귀포시(86)

(읍면지역) 애월(24), 한림·한경(21), 대정‧안덕(32), 구좌,(19),

성산(12), 남원(22), 표선(15), 조천(25)

□ 향후계획

❍ 동지역 유수율 제고사업(동지역, 제주(서부) 현대화) 지속 추진(K-water위탁)

❍ 애월, 구좌․성산 노후상수관망 정비사업(K-water위탁) 추진

❍ 읍면지역 블록구축 완료지역 유지관리용역 지속 추진

35. k-water, 제주특별자치도 간 협약 추진 상황

□ 물 분야 상생발전을 위한 업무협약 체결(2015.11.23.)

❍ 읍·면 지역 년도 별 협약체결 현황

년도별	공기관 대행 사업비(백만원)					협 약 체결일
	계	실시설계 등		사업관리비
		금 액	사업지역	금 액	사업지역
2016년	2,207	1,423	시범지역 (토평,애월 일부)	784	시범지역 (토평,애월일부)	'15.12.31.
2017년	2,935	2,141	한림한경	794	애월, 한림한경	'17.02.06.
2018년	4,273	3,352	조천, 대정안덕	921	조천 한림한경,	'18.01.30.
2019년	5,750	4,707	공사비 조천,대정안덕	1,043	조천, 대정안덕	'19.11.12.
2022년	3,000	-	-	3,000	한림·한경 대정·안덕	'22.12.26.
2023년	11,000	-	-	11,000	한림·한경 대정·안덕 조천	'23.12.29.
2024년	46,000	1,728	구좌·성산	44,272	구좌·성산	'24.03.26.

□ 상수도 유수율 제고를 위한 기본협약 체결(2018.1.25.)

❍ 동지역 상수도 유수율제고사업 위탁협약체결(2019.12.26.)

- 대상지역 : 제주시 동지역(오라중블록제외), 서귀포시 동지역(토평중블록제외)

- 위탁범위 : 블록시스템 구축 등 시설개선 및 급배수관망 운영관리

- 세부사업내용

· 목표유수율 : 46% → 75%(29% 향상)

· 대상시설 : 배‧급수관 운영 3,392㎞

· 사업기간 : 2020. ~ 2026. 6월

· 사 업 비 : 1,326억원(시설개선 1,093, 운영관리비 233)

❍ 제주시 동지역(서부) 지방상수도현대화사업 위탁협약체결(2020.12.08.)

- 대상지역 : 제주시 동지역 서부권(연동, 노형동 8개 행정동)

- 세부사업내용

· 목표유수율 : 46% → 85%(38% 향상) 46천톤/일 절감

· 대상시설 : 소블록 구축 31개소, 배급수관정비 L=59.4㎞, 유지관리시스템구축, 누수탐사복구 등

· 사업기간 : 2020. ∼ 2024.(협약기간: 20.~25.)

· 사 업 비 : 698억원(국 349, 지 349)

❍ 제주특별자치도 지방상수도 현대화사업 및 성과관리 위수탁 협약체결(2024.3.26.)

- 대상지역 : 제주시 구좌읍, 서귀포시 성산읍 일부

- 세부사업내용

· 목표유수율 : 대상지역 유수율 85% 달성(1년 유수율 85%유지관리)

· 대상시설 : 노후관망 정비 L=89.55㎞, 누수탐사복구 등

· 사업기간 : 2024. ∼ 2029.(협약기간: 24.~29.)

· 사 업 비 : 460억원(국 230, 지 230)

36. 블록시스템 구축 및 유지․관리에 따른 성과(효과)

□ 블록구축 사업성과

❍ '23. 12. 블록구축 378개소 구축 완료(100%)

❍ 블록구축 기반 유수율 제고 사업 토대 마련

구분	블록현황
	계 획				실 적
	계	대	중	소	소계	대	중	소
계	378	17	116	245	378	17	116	245
애월대블록	24	1	7	16	24	1	7	16
한림한경 대블록	21	1	4	16	21	1	4	16
대정안덕 대블록	32	1	12	19	32	1	12	19
구좌대블록	19	1	8	10	19	1	8	10
성산대블록	12	1	4	7	12	1	4	7
남원대블록	22	1	7	14	22	1	7	14
표선대블록	15	1	5	9	15	1	5	9
조천대블록	25	1	7	17	25	1	7	17
제주시 동지역(동부)	79	2	24	53	79	2	24	53
제주시 동지역(서부)	42	1	9	32	42	1	9	32
서귀포시 동지역	87	6	29	52	87	6	29	52

37. 노후(20년이상) 상수도관 현황, 정비계획 및 추진실적

□ 노후수도관 현황(급수관 제외)

도·송·배수관로	노후수도관	노후수도관 비율(%)
4,833	1,316	27.2%

※ ’21년 노후상수도관 정밀조사 용역 결과

□ 매설 연도별                                     (단위 : km)

년도	상수도관로 연장
	계	21년 이상 (1999년 이전)	16년 이상 ~20년 이내 (2000~2004)	11년 이상 ~15년 이내 (2005~2009)	6년 이상 ~10년 이내 (2010~2014)	5년 이내 (2015~2019)
합 계	6,316.4	2,806.7	1,006.6	1091.7	788.3	623.1
도수관	107.9	66.3	20.5	18.6	1.1	1.4
송수관	472.6	70.5	126.6	133.5	79.1	62.9
배수관	4,252.6	1,675.6	694.8	794.0	628.3	459.9
급수관	1,483.3	994.3	164.7	145.6	79.8	98.9

※ 주요 관경 : 도수관 D300~800㎜, 송수관 D300~700㎜, 배수관 D500~80㎜, 급수관 D50㎜이하

□ 노후상수관로 정밀조사(노후도 평가) 결과

년도	상수도관로 연장(단위 km)				비 고
	계	상태양호(Ⅰ등급)	노후진행(Ⅱ등급)	노후추정(Ⅲ등급)
합 계	4,833.0	1,524.9	1,992.3	1,315.8
도수관	107.9	44.1	57.8	6.0
송수관	472.6	338.9	111.7	22.0
배수관	4,252.5	1,141.9	1,822.8	1,287.8

- 노후상수관로정밀조사 보고서 환경부 제출(2021.2.24.)

※ 『수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준(환경부, 2016)』 적용

주요 관경 : 도수관 D300~800㎜, 송수관 D300~700㎜, 배수관 D500~80㎜, 급수관 D50㎜이하  평가대상에서 제외되어 평가 및 사업비 미산정

□ 노후상수관로 교체 실적 및 계획

❍ 추진실적 : ʼ16~ʼ23년 220.4km

❍ 추진계획 : 환경부 노후상수관망정비사업 지속 반영 추진

- 2025년 노후상수관망 정비사업(4개사업): ‘25. ~ ’30. / 1,837억 / 295.2㎞

38. 제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획 추진상황

❍ 하수도시설의 계획적·체계적 정비를 도모하기 위하여 하수도법 제5조에 따라 수립하는 하수도정비에 관한 20년 단위 기본계획*

* 수립권자 : 제주특별자치도지사,  * 승인권자 : 환경부장관

❍ 하수도정비 및 인프라 확충에 `40년까지 3조 3,331억 투자 계획

□ (계획지표)

❍ (목표연도) 2040년(5개년 단위 시행계획, 4단계로 구분)

❍ (계획지표)

구 분		현재('20)	1단계('25)	2단계('30)	3단계('35)	4단계('40)
계획인구(인)		799,942	957,075	1,038,650	1,108,837	1,161,175
	상주인구	697,578	731,135	768,120	795,857	807,765
	유동인구	102,364 (연간 10,236,445)	225,940 (연간 22,594,000)	270,530 (연간 27,053,000)	312,980 (연간 31,298,000)	353,410 (연간 35,341,000)
하수처리구역(㎢) (제주도 면적 대비 비율)		166.819 (9.02%)	195.312 (10.56%)	209.700 (11.33%)	210.018 (11.35%)	210.018 (11.35%)
계획하수량(톤/일)		254,371	364,093	388,280	406,275	417,904
시설용량(㎥/일)		259,878	313,588	417,588	433,588	433,588
보급률(%)		92.2	92.3	92.7	92.9	93.0

□ (정비계획) 투자규모 3조 3,556억원

❍ (공공하수처리시설 확충) 신·증설 9개소, 173천톤, 6,981억원

- 현재 증설 : 4개소(13만톤/일) → 제주 90, 서부 20, 동부 12, 남원 8

- 향후 증설 : 4개소(27천톤/일) → 보목 7, 색달 5, 대정 13, 성산 2

- 신설 : 1개소(16천톤/일) → 삼화 16

❍ (하수관로 정비) 1,350㎞(신설 477, 노후관로 개량 850), 2조 6,082억원

- 중계펌프장 신□증설 49개소(신설 2, 증설 47), 우수토실 정비 194개소

❍ (월류수처리시설) 신설 9개소, 121억원

❍ (분뇨 처리시설) 개량(우도) 1개소, 53억원

❍ (하수슬러지시설) 건조시설 2개소, 319억원

□ (추진상황)

❍ (’23. 3. 7) 도 광역 하수도정비 기본계획 보완 요구(환경부)

❍ (’23. 5.25) 환경부 보완내용(2차) 조치사항 및 수정보고서 제출

❍ (’23. 7.13) 2040년 제주특별자치도 하수도정비 기본계획 환경부 승인

□ (추진계획)

❍ 도내 여건 변화에 대응한 하수도 인프라 확충사업 대대적 추진

39. 하수관거 정비사업 추진상황(전체-BTL+재정사업)

□ 현 황

사업명	사업개요	총사업비 (억원)			사업 기간	도급자	계약 주체	추진상황
		고시금액	계약금액	낙찰율
ʼ06제주시 동지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 67km □ 배수설비 : 3,119개소	752	485	64.2%	ʼ08.3 ~ ʼ11.7.	푸른제주 지키미(주)	푸른제주 지키미(주)	□ʼ08. 3. 3. 착공 □ 공정율 : 100% - ʼ11. 7. 2. : 준공 - 관로 : 67km - 배수설비: 3,119개소
ʼ06제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 102km □ 배수설비 : 4,407개소	858.62	537.97	62.65%	ʼ08.3. ~ ʼ11.3.	제주엔 바이로 (주)	제주엔 바이로 (주)	□ʼ08. 3. 3. 착공 □ 공정율 : 100% - ʼ11. 3. 2. : 준공 - 관로 : 102km - 배수설비: 4,417개소
ʼ06서귀포시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 114km □ 배수설비 : 5,395개소	873.02	794.87	91.05%	ʼ08.2. ~ ʼ11.4.	청정서귀포주식회사	청정서귀포주식회사	□ʼ08. 2.29. 착공 □ 공정율 : 100% - ʼ11. 4. 28. : 준공 - 관로 : 114km - 배수설비 : 5,395개소
ʼ08제주시 동지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 68km □ 배수설비 : 5,649개소	609	577	94.7%	ʼ10.5. ~ ʼ13.1.	푸른제주 환경(주)	푸른제주 환경(주)	□ʼ10. 5. 1. : 착공 □ 공정율 : 100% - ʼ13. 1.31. : 준공 - 관로 : 68km - 배수설비 : 5,649개소
ʼ08제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 108km □ 배수설비 : 4,407개소	854.90	821.77	96.12%	ʼ10.5. ~ ʼ13.7.	제주맑은물 사랑(주)	제주맑은 물사랑(주)	□ʼ10. 5. 1. : 착공 □ 공정율 : 100% - ʼ13. 7.31. : 준공 - 관로 : 108km - 배수설비 : 4,407개소
ʼ09제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 56km □ 배수설비 : 1,469개소	444.46	409.53	92.14%	ʼ11.1. ~ ʼ13.12.	제주 에코텍 (주)	제주 에코텍 (주)	□ʼ11. 2. 25. : 착공 □ 공정율 : 100% - ʼ13.12.24. : 준공 - 관로 : 56km - 배수설비 : 1,469개소
ʼ10제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	□ 우오수관 : 56km □ 배수설비 : 1,599개소	421.89	405.55	96.13%	ʼ12.8. ~ ʼ15.8.	제주맑은물 (주)	제주 맑은물 (주)	□ʼ15. 8. 27. : 착공 □ 공정율 : 100% - ʼ15. 8.26. : 준공 - 관로 : 56㎞ - 배수설비 : 1,599개소

□ 사업별 우·오수관 미연결 가구현황(최근3년)

사업명	총사업량 (배수설비)	우,오수관 미연결가구수	사 유 별			완료	비고
			구조적 불가	사유지 통과	가옥주 반대
계	26,592	516	82	104	330	259
ʼ06제주시 동지역 하수관거 BTL사업	3,132	25	5	20	-	1
ʼ06제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	4,551	134	2	13	119	94
ʼ06서귀포시 읍면지역 하수관거 BTL사업	5,395	29	-	-	29	-
ʼ08제주시 동지역 하수관거 BTL사업	5,832	120	71	28	21	63
ʼ08제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	4,475	68	-	3	65	49
ʼ09제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	1,519	51	1	2	48	33
ʼ10제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업	1,688	89	3	38	48	19

※ 총사업량(배수설비) 26,592가구 = (준공)26,064가구 + (미연결)26,076가구

40. 세부사업별 집행 현황(예산 1억원 이상 시설비)

□ 2023년

(단위 : 천원)

세부사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)	비 고
합 계	152,237,069	116,341,796	35,935,272
중문관광단지 하수관로 정비사업	9,330,536	6,185,892	3,144,644
서귀포 예래대륜(2단계) 하수관로 정비사업	16,070,062	10,634,890	5,435,172
서귀포 서홍동홍(2단계) 하수관로 정비사업	3,489,873	3,266,359	263,514
서귀포 보목토평 하수관로 정비사업	11,936,095	10,931,271	1,004,824
서귀포시 동지역 차집관로 정비사업	1,772,020	1,604,737	167,283
대정하수처리장 차집관로 정비사업	1,856,700	1,856,700	-
서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업	2,353,267	1,967,021	386,246
남원하수처리구역 하수관로 정비사업(2단계)	5,023,660	3,453,645	1,570,015
남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업	3,405,781	2,878,962	526,819
서귀포 성산3 하수관로 정비사업	5,950,504	4,701,017	1,249,487
성산하수처리구역 차집관로 정비사업	833,000	833,000	-
서귀포대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비사업	1,028,504	758,927	269,577
서귀포지역 소규모 하수관로 정비사업	700,000	518,395	181,605
대정읍 일원 침수지역 하수관로 정비 기본설계용역	100,000	87,571	12,429
사계리 하수관로 정비사업	500,000	471,335	28,665
서귀포 남원하수처리장 증설사업	8,023,665	7,517,006	506,659
서귀포 오조리 중계펌프장 하수관로 개선공사	300,000	278,988	21,012
동부(월정)하수처리장 증설사업	8,477,040	3,942,837	4,534,203
서부(판포)하수처리장 증설사업	11,585,800	9,409,441	2,176,359
도두(이호처리분구) 노후하수관로 정비사업	8,178,083	7,214,901	963,182
도두하수처리구역 하수관로 정비사업	3,517,478	3,509,803	7,675
오라아라 하수관로 정비사업	9,931,930	8,951,762	980,168
제주서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계)	6,264,903	5,019,439	1,245,464
조천처리분구 하수관로 정비사업	3,481,436	2,464,031	1,017,405
서부하수처리구역 차집관로 정비사업	1,303,046	678,360	624,686
제주시 농어촌 하수도 정비사업(우도 천진리)	2,065,409	1,247,424	817,984
제주하수처리구역 차집관로 정비사업	1,153,091	33,644	1,119,447
동부하수처리구역 차집관로 정비사업	833,000	833,000	-
추자면 농어촌마을 하수도 정비사업	4,085,515	-	4,085,515
제주시 농어촌마을 하수도 정비사업(우도 비양동)	4,813,388	2,720,598	2,092,790
하귀2리 하수관로 정비공사	1,857,917	1,582,649	275,268
하수관로 BTL사업 분구내 배수설비 공사	300,000	289,148	10,852
제주시 소규모 하수관로 정비사업	704,672	690,564	14,108
제주하수처리장 시설운영관리	303,258	283,663	19,595
제주하수처리장 관로운영관리	1,798,300	1,777,521	20,779
소규모 공공하수처리시설 스마트 통합시스템 구축	606,000	285,340	320,660
소규모하수처리장 시설관리	349,681	286,108	63,573
동부하수처리장 시설운영관리	520,000	513,978	6,022
서부하수처리장 시설운영관리	1,168,661	780,279	388,382
보목하수처리장 시설운영관리	2,433,794	2,356,336	77,458
호근위생처리장 시설운영관리	550,000	532,862	17,138
색달하수처리장 시설운영관리	930,000	770,008	159,992
대정하수처리장 시설운영관리	869,000	856,626	12,374
대정하수처리장 공공 환경시설 탄소중립 지원	146,000	138,500	7,500
남원하수처리장 시설운영관리	386,000	290,455	95,545
성산하수처리장 시설운영관리	950,000	936,803	13,197

□ 2024년

(단위 : 천원)

세부사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)	비 고
합 계	125,942,020	62,104,894	63,637,126
중문관광단지 하수관로 정비사업	9,056,359	5,652,824	3,403,535
서귀포 예래대륜(2단계) 하수관로 정비사업	5,953,171	3,012,640	2,940,531
서귀포 서홍동홍(2단계) 하수관로 정비사업	4,462,514	537,457	3,925,057	-
서귀포 보목토평 하수관로 정비사업	1,504,824	1,298,255	206,569
남원하수처리구역 하수관로 정비사업(2단계)	1,902,015	1,210,587	691,428
대정하수처리장 차집관로 정비사업	200,000	-	-
서귀포 성산3 하수관로 정비사업	10,666,487	5,373,815	5,292,672
대정하수처리구역 차집관로 정비사업(2단계)	833,000	749,000	84,000
남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업	1,166,818	590,310	576,508
서귀포시 동지역 차집관로 정비사업	2,229,283	1,330,348	898,935
성산하수처리구역 차집관로 정비사업	467,000	3,169	463,831
대정공공하수처리장 증설사업	833,000	749,000	84,000
도시침수 대응사업	833,000	749,000	84,000
서귀포지역 소규모 하수관로 정비사업	436,605	350,253	86,352
서귀포대포처리분구 펌프장 및 하수관로 정비사업	1,112,831	664,069	448,762
동부(월정)하수처리장 증설사업	12,074,203	3,081,839	8,992,364
서부(판포)하수처리장 증설사업	21,357,954	11,275,530	10,082,424
도두(이호처리분구) 노후하수관로 정비사업	9,063,182	5,138,193	3,924,989
도두하수처리구역 하수관로 정비사업	1,757,675	1,371,251	386,424
오라아라 하수관로 정비사업	5,699,168	3,934,299	1,764,869
제주서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계)	4,057,463	3,083,844	973,619
조천처리분구 하수관로 정비사업	3,941,406	1,187,044	2,754,362
서부하수처리구역 차집관로 정비사업	2,744,686	200,000	2,544,686
제주하수처리구역 차집관로 정비사업	1,319,446	466,361	853,085
동부하수처리구역 차집관로 정비사업	1,000,000	224,500	775,500
하귀2리 하수관로 정비공사	255,889	202,689	53,200
동부(월정)하수처리장 방류관 연장사업	230,000	-	230,000
월평동 하수관로 정비사업	198,000	-	198,000
하수관로 BTL사업 분구내 배수설비공사	150,000	56,825	93,175
제주시 소규모 하수관로 정비사업	1,000,000	188,885	811,115
제주시 농어촌마을 하수도 정비사업(우도 비양동)	2,292,790	1,482,135	810,655
제주시 농어촌 하수도 정비사업(우도 천진리)	817,984	534,778	283,206
추자면 농어촌마을 하수도 정비사업	5,085,515	112,008	4,973,507
제주하수처리장 시설운영관리	397,801	289,209	108,592
제주하수처리장 관로운영관리	650,000	399,981	250,019
소규모 공공하수처리시설 스마트 통합시스템 구축	4,858,000	3,637,744	1,220,256
소규모하수처리장 시설관리	64,510	14,510	50,000
동부하수처리장 시설운영관리	200,000	79,030	120,970
서부하수처리장 시설운영관리	1,254,441	539,306	715,135
보목하수처리장 시설운영관리	1,000,000	947,454	52,546
색달하수처리장 시설운영관리	500,000	50,854	449,146
대정하수처리장 시설운영관리	665,000	453,383	211,617
남원하수처리장 시설운영관리	400,000	172,996	227,004
성산하수처리장 시설운영관리	1,250,000	709,519	540,481

41. 하수처리구역 내 하수관로 미설치 현황 및 향후 설치계획

□ 하수관로 미설치 현황

구 분		계획연장 (m)	시설연장 (m)	미설치연장 (m)	미설치율 (%)	비 고
총 계		5,868,545	5,392,917	475,628	8.1%
제주시	한림읍	306,379	256,534	49,845	16.3%
	애월읍	438,329	369,753	68,576	15.6%
	구좌읍	281,194	264,457	16,737	6.0%
	조천읍	245,693	219,127	26,566	10.8%
	한경면	190,753	169,349	21,404	11.2%
	추자면	22,047	16,884	5,163	23.4%
	우도면	33,688	25,030	8,658	25.7%
	일도1동	15,665	15,550	115	0.7%
	일도2동	93,463	93,382	81	0.1%
	이도1동	36,971	36,971	0	0.0%
	이도2동	190,383	187,711	2,672	1.4%
	삼도1동	47,461	47,436	25	0.1%
	삼도2동	50,471	49,335	1,136	2.3%
	용담1동	32,523	32,523	0	0.0%
	용담2동	99,450	94,494	4,956	5.0%
	건입동	55,715	55,227	488	0.9%
	화북동	110,556	110,331	225	0.2%
	삼양동	127,495	121,878	5,617	4.4%
	봉개동	64,648	55,305	9,343	14.5%
	아라동	196,155	194,419	1,736	0.9%
	오라동	81,022	70,519	10,503	13.0%
	연동	132,167	130,821	1,346	1.0%
	노형동	185,969	180,096	5,873	3.2%
	외도동	99,259	93,463	5,796	5.8%
	이호동	41,134	40,864	270	0.7%
	도두동	51,931	51,931	0	0.0%
서귀포시	대정읍	335,222	316,003	19,219	5.7%
	남원읍	439,187	414,943	24,244	5.5%
	성산읍	358,214	319,288	38,926	10.9%
	안덕면	213,117	198,340	14,777	6.9%
	표선면	198,685	172,601	26,084	13.1%
	송산동	76,613	69,872	6,741	8.8%
	정방동	30,713	27,321	3,392	11.0%
	중앙동	28,818	24,969	3,849	13.4%
	천지동	41,844	37,235	4,609	11.0%
	효돈동	83,923	76,510	7,413	8.8%
	영천동	139,223	129,410	9,813	7.0%
	동홍동	104,717	93,371	11,346	10.8%
	서홍동	56,937	51,934	5,003	8.8%
	대륜동	167,717	156,393	11,324	6.8%
	대천동	124,783	111,723	13,060	10.5%
	중문동	119,750	107,549	12,201	10.2%
	예래동	118,561	102,065	16,496	13.9%

□ 향후 설치계획

❍ 사업시행 및 재원확보 연속성 고려, 기 승인된 하수관로 정비 우선순위를 준용해 사업 우선순위 선정 추진

	사업 우선순위
□ (1단계 2025년) 현재 시행중인 사업(설계․시공중) 및 사업지역과 연계하여 시가화 진행정도가 빠르고 긴급히 소요가 제기된 지역 □ (2단계 2030년) 기존처리구역과 인접하여 전원주택 및 팬션 등 건축물의 증가로 처리구역 확대가 필요한 지역 □ (3단계 2035년) 동지역의 외곽지역, 장거리 이송이 필요한 마을단위의 처리구역편입 또는 장래개발계획에 의해 추가되는 처리구역

42. 사유지에 시설된 하수도 시설 현황

“ 해당사항 없음 ”

43. 노후 차집관로 현황

(단위: ㎞)

구 분	차집관로		비고
	총연장	20년 이상 노후관로
소계	373	176
제주처리구역	55	35
서부처리구역	55	23
동부처리구역	62	45
보목처리구역	30	9
색달처리구역	53	14
대정처리구역	41	17
남원처리구역	44	19
성산처리구역	33	14

44. 차집관로 정비사업 추진 현황 및 계획(최근 3년간)

□ 현    황                                        (2023. 6. 30. 기준)

구분	차집관로(㎞)		하수펌프장(개소)			비고
	총연장	20년 이상 (노후도)	총개소	중계펌프장	간이 펌프장
계	373	176(47%)	664	124	540
제 주 시	172	103(59%)	439	56	383
서귀포시	201	73(37%)	225	68	157

□ 문 제 점

❍ 최근 5년간 차집관로 하수유출 68건 발생

⇨ (원 인) 20년 이상된 노후관로 부식 및 파손에 따른 하수유출

❍ 합류식/분류식 하수관로 혼재와 건축물 옥내 오접 등으로 우기시 하수펌프장 시설용량 대비 유입하수량 증가에 따른 월류사고 발생

□ 추진상황

❍ 차집관로 정비사업(‘17∼‘22) 추진 : 5건·31.51㎞·409억원

- (도두) 3.84㎞·95억원, (동부) 15.1㎞·75억원, (서부) 1.01㎞·8억원, (중문) 3.3㎞·159억원, (대정) 8.26㎞·72억원

❍ 노후 하수관로 정밀조사 완료 : 227㎞, 13.3억원(‘20.6.~‘21.4월)

- (조사결과) 굴착 보수구간 7.3㎞, 비굴착 보수구간 2.5㎞, 맨홀보수 667개소

□ 노후 차집관로 정비사업 추진('20 ~ '28): 7건, 2,659억원

- (제주) 22.1㎞·펌프장 개량 2개소·334억원, (서부) 34.3㎞·펌프장 개량 22개소·448억원, (동부) 36.5㎞·펌프장 개량 7개소·413억원 (서귀포 동지역) 35.7㎞·펌프장 개량 5개소·436억원, (성산) 22.0㎞·펌프장 증설 5개소·192억원, (남원) 14.8㎞·펌프장 개량 9개소·202억원 (대정) 51.8㎞·펌프장 증설 5개소·634억원

□ 추진계획

□ ('24년 차집관로 정비 실시설계용역 등 추진) 8건·7km·75억

- 제주시 3건(동지역, 서부, 동부) 33억원,  서귀포시 5건(동지역, 남원, 성산, 대정2) 42억원

45. 오수 유출사고 발생 및 처리 현황(최근 3년간)

□ 2022년

처리장	유출시설명	내용	조치사항	보상액
보목	자구리 중계펌프장	◦ 일시 : 2022. 1. 28.(10:00) ◦ 위치 : 서귀동 15-1(자구리펌프장) ◦ 원인 : 압송관로 콘크리트 보호공 하중(추정)으로 인한 파손	·차집관로(압송관) D=300mm(2열) 교체
	서홍3 간이펌프장	◦ 일시 : 2022. 10. 25.(12:05) ◦ 위치 : 서홍동 2566(서홍3교 옆) ◦ 원인 : 수위센서 고장으로 인한 인근 하천으로 하수 유출	·수위센서 교체 및 펌프장 제어반 점검
	정방 중계펌프장	◦ 일시 : 2022. 11. 4.(14:00) ◦ 위치 : 칠십리로 156-8 (서복전시관)입구 ◦ 원인 : 노후로 인한 하수관로 파손으로 하수유출, 보행로 구간 함몰	·VR관(D=600mm)교체 ·인도 보도블럭 포장 복구
색달	중문동부중계펌프장	◦ 일시 : 2022. 12. 5.(08:00) ◦ 위치 : 색달동 천제2교 동측 끝 인도부분 ◦ 원인 : 노후 압송관로 파손	·압송관 긴급복구 (D=200mm)
	중문동부중계펌프장	◦ 일시 : 2022. 12. 9.(09:50) ◦ 위치 : 색달동 천제2교 서남측 끝 인도부분 ◦ 원인 : 노후 압송관로 파손	·압송관 긴급복구 (D=200mm)
	중문관광단지 테디베어 삼거리 합류맨홀	◦ 일시 : 2022. 12. 6.(08:30) ◦ 위치 : 색달동 2822-1 (테디베어박물관 삼거리 합류맨홀) ◦ 원인 : 관경부족으로 인한 오수 역류	·중문관광단지 하수관로 정비사업 시행중
대정	대정4 펌프장	◦ 일시 : 2022. 1. 25.(09:00분경) ◦ 위치 : 대정4펌프장(대정읍 일과리 1939-3) 옆 도로 ◦ 원인 : 압송관 파손	·압송관 교체 완료 (D=200mm, L=6m)
	안덕5 펌프장	◦ 일시 : 2022. 4. 1.(09:00분경) ◦ 위치 : 안덕5펌프장 (대정읍 상모리 1-16) ◦ 원인 : 세목스크린 전단 다량이 이물질 유입 오수흐름 방해 펌프장옆 하천으로 월류 발생	·이물질 제거 정상가동 조치 완료
	대정1 펌프장	◦ 일시 : 2022. 8. 11.(11:00분경) ◦ 위치 : 대정1펌프장(대정읍 신도리 3076-2) 옆 도로 ◦ 원인 : 압송관 파손	·압송관로(D=150mm) 보수 완료
성산	시흥1간이펌프장	◦ 일시 : 2022. 8. 12. (11:00) ◦ 위치 : 시흥1간이펌프장 (성산읍 시흥리) ◦ 원인 : 맨홀펌프장 전단 유입 관로 맨홀 일시적 월류 및 인근 가정집 하수 역류	·인근 하수 역류 피해 가정집에 대해 하수 역류방지 장치 설치 ·시흥1간이펌프장 →시흥4중계펌프장 압송관로(D80mm→ D150mm)확장 공사	-

□ 2023년

처리장	유출시설명	내용	조치사항	보상액
색달	중문 해수욕장	◦ 일시: 2023. 5. 9. (13:00) ◦ 위치: 중문해수욕장 중간 (롯데호텔 남측) ◦ 원인: 중문관광단지 테디베어 삼거리 집수정으로 다량의 오·우수 유입에 따른 관경 초과로 넘친 하수 일부가 우수관을 통해 중문해수욕장으로 유출	·천제연중계펌프장 압송관로 연장공사 ·임시관로 및 펌프장 신설 ·중문관광단지 하수 관로 정비사업 중
남원	남원9중계펌프장	◦ 일시: 2023. 4. 11. (9:20) ◦ 위치: 남원9중계펌프장 동측 포구 내 맨홀 ◦ 원인: 긴급차단수문 오동작에 의한 닫힘으로 오수가월류 발생	·준설차 투입 유출 오수 준설
성산	성산2중계펌프장 압송관로	◦ 일시 : 2023. 6. 15 (10:00경) ◦ 위치 : 성산2중계펌프장~본처리장 구간(광치기 해변도로) ◦ 원인 : 하수도 유해가스로 인한 VR관 상부가 심한부식으로 파손이 진행되어 관로 함몰 아스콘표면 및 맨홀하수 유출	·자연유하구간(L=30M) 긴급복구공사 완료

□ 2024년

처리장	유출시설명	내용	조치사항	보상액
서부	곽지 중계펌프장 애월 중계펌프장	◦ 일시 : 2024. 1. 20.(11:00경) ◦ 위치 : 일주서로 곽금초교 건너편 인도 구간(버스정류소 주변) ◦ 원인 : 차집관로 노후 및 관로 부식으로 인한 자연함몰로 오수 누수	·차집관로(L=108m) 긴급 복구공사 완료	민간 보조사업 25,000,000원 (금성어촌계)
색달	중문골프장 클럽하우스 내	◦ 일시 : 2024. 5. 27. ◦ 위치 : 중문관광단지내 중문골프장 클럽하우스 일원 ◦ 원인 : 일시적 물량증가에 따른 역류로 맨홀상부 유출현상 발생	·사고맨홀 상부폐쇄 및 일부 하수 신설 오수관로 맨홀로 분산 처리
성산	성산2중계펌프장 압송관로	◦ 일시 : 2024. 3. 20. ◦ 위치 : 성산2중계펌프장~본처리장구간(광치기 해변도로) ◦ 원인 : 하수도 유해가스로 인한 VR관 파손․함몰	·자연유하구간(L=141M) 긴급복구공사 완료

46. 불명수 유입 현황, 원인 및 저감 대책(최근 3년간)

□ 공공하수처리시설별 불명수 유입현황

❍ (2022년)

구 분	시설용량(㎥/일) (ʼ22년 기준)	청천시 유입하수량(㎥/일)	강수시 유입하수량(㎥/일)	불명수 유입량(㎥/일)
계	258,000	233,352	266,956	33,604
제 주	130,000	130,680	147,020	16,340
서 부	24,000	25,207	30,307	5,100
동 부	12,000	11,494	13,668	2,174
보 목	30,000	16,663	22,112	5,449
색 달	23,000	18,482	19,345	863
대 정	21,000	15,525	17,851	2,326
남 원	8,000	8,448	8,902	454
성 산	10,000	6,853	7,751	898

❍ (2023년)

구 분	시설용량(㎥/일) (ʼ23년 기준)	청천시 유입하수량(㎥/일)	강수시 유입하수량(㎥/일)	불명수 유입량(㎥/일)
계	266,000	236,662	280,264	43,572
제 주	130,000	133,308	145,977	12,669
서 부	24,000	24,830	34,144	9,284
동 부	12,000	10,929	14,363	3,434
보 목	30,000	18,111	25,219	7,108
색 달	23,000	19,005	21,017	2,012
대 정	21,000	17,140	20,363	3,223
남 원	16,000	8,751	9,078	327
성 산	10,000	4,588	10,103	5,515

❍ (2024년)

구 분	시설용량(㎥/일) (ʼ24.8월 기준)	청천시 유입하수량(㎥/일)	강수시 유입하수량(㎥/일)	불명수 유입량(㎥/일)
계	266,000	243,363	279,192	35,829
제 주	130,000	133,269	145,478	12,209
서 부	24,000	26,328	29,189	2,861
동 부	12,000	12,315	14,403	2,088
보 목	30,000	17,730	25,053	7,323
색 달	23,000	21,573	23,315	1,742
대 정	21,000	18,424	22,666	4,242
남 원	16,000	8,621	9,448	827
성 산	10,000	5,103	9,640	4,537

□ 유입 원인

❍ 합류식(오수+빗물·지하수, 상류지역) 및 분류식(우·오수관 분리, 하류지역) 하수관로 혼재

❍ 오수관 맨홀 파손, 이음부 결함, 관로 균열

❍ 기존 건축물 내 배수설비 오접(우‧오수관 미분리)

❍ 저수밀관(콘크리트관 등)의 수밀성 미확보

□ 저감 대책

❍ 합류식 하수관로 분류식 하수관로 정비 강화 및 우수 토실 정비

- 상류지역 우수 토실 폐쇄 및 해안변 우수토실 유량조절 장치 설치

❍ 기존 노후 관로 및 건축물 배수설비 오접실태 점검 및 정비

- 단계별 관로 기술진단/정밀조사를 통한 관로/배수설비 상태 점검 및 정비

❍ 신축 건축물 준공 시 오수관로 연막시험 등 오접 여부 확인

❍ 개인배수설비 행정지도 강화 및 올바른 하수처리 홍보(언론 등)

47. 하수처리장별 증설 현황 및 추진 계획

□ 추진개요

❍ 사업내용 : 하수처리장(8개) 증설 150천톤(266천톤 → 416천톤)

(단위 : 천톤/일, 억원)

처리장	시설용량		총 사업비				사업기간	비 고
	현재	증설 후 (증설량)	계	기투자	’24년	향후
계	266	416(150)	6,148	1,172	901	4,075	’15.~’29.
제 주	130	220(90)	4,283	475	675	3,133	’19.~’28.	시공 중 (공정률 13%)
동 부	12	24(12)	538	420	26	92	’17.~’25.	공사중지 (공정률 31%)
서 부	24	44(20)	484	277	192	15	’21.~’25.	시공 중 (공정률 74%)
대 정	21	34(13)	423	-	8	415	’24.~’28.	‘24. 신규사업 (실시설계 추진)
색 달	23	38(15)	420	-	-	420	’25.~’29.	‘25 예산 편성 예정
남 원	16		-	-	-	-	’20.~’23.	증설준공 (’23.8.28.)
보 목	30		-	-	-	-	’18.~’20.	증설준공 (’20.7.31)
성 산	10		-	-	-	-	’15.~’17.	증설준공 (’17.12.20)

□ 추진상황

❍ ('15.~'23.) 서귀포지역 5개 처리장* 38.5천톤/일 증설 완료(1,428억원)

* 색달(6.5천톤/118억), 보목(10천톤/674억), 대정(8천톤/270억) 성산(6천톤/157억), 남원(8천톤/209억)

❍ ('17.~'25.) 시공 중 3개소(제주, 동부, 서부), 설계 중 1개소(대정)

□ 추진계획

❍ (제주) 현대화사업 수처리시설(22만㎥/일) 완공('25. 12.), 전체 준공('28. 1.)

❍ (동부) '25. 12월 동부처리장 증설사업 준공 및 월정리 주민지원사업 추진

❍ (서부) '25. 12월 증설 가동 목표로 계획기간 내 완공 추진

❍ (대정) '25. 6월 실시설계용역 완료, '25. 10월 공사 발주 예정

❍ (색달) '25. 2월 실시설계용역 발주

48. 하수처리장별 어업피해조사 관련

□ 제주하수처리장 어업 피해 보상

<방류수로 인한 어업피해보상>

□ 1차년도 용역 : 방류수가 해양생태계에 미치는 영향조사

- 조사지역 : 도두동 연안해역

- 조사내용 : 해양수질조사, 해양퇴적물조사, 해양생태조사

- 조사기간 : 2015. 1. 5. ~ 2015. 12. 20.

□ 2차년도 용역 : 해양생태계 영향으로 인한 어업피해조사결과

- 조사내용 : 부유물질로 인한 어업의 피해정도

- 조사기간 : 2016. 4. 27. ~ 2017. 7. 21.

□ 조치결과 : 1,591백만원 지급완료(2018. 11월)

<현대화사업 어업피해보상>

❍ 협약내용

- 제주공공하수처리시설 현대화사업 시 해양방류관로 설치에 따른 어업피해조사

- 수탁자 : 한국부동산원

- 총사업비: 2,000백만원

□ 추진상황

- '23. 4. 28. : 전체 시설공사 착공

- '23. 11. 27.: 어업보상업무 위․수탁 협약 체결(도↔한국부동산원)

- '24. 1. 8.  : 어업손실보상 약정서 체결

- '24. 5.     : 해양방류관로 설치공사 착수

- '24. 5. 17. : 어업피해조사 간담회 실시(도두/용담어촌계)

- '24. 7. 15. : 어업피해조사 착수

	《용역개요》
‣ 조사기관: 제주대학교 산학협력단 ‣ 용역기간: 2024. 7. 15.~ 2025. 7. 14. ‣ 용 역 비: 650백만 원 ‣ 조사대상 : 도두/용담어촌계 마을어업 및 어선어업 등 ‣ 과업범위 : 어업피해조사 1식(피해범위 및 정도, 생산량 및 손실액 산출 등)

❍ 향후 추진계획

- '25. 7.: 어업피해조사 완료 / '25. 12.: 감정평가 및 보상 완료

- '25. 12 : 해양방류관로 설치공사 완료 / '28. 1. 27.: 전체 시설공사 준공

□ 동·서부하수처리장

□ 협약내용

- 동부(월정) 12,000→24,000톤, 서부(판포) 24,000→44,000톤 증설 및 우도 450톤 신설에 따른 어업피해조사 및 보상업무

- 수탁자: 한국농어촌공사(공기관대행)

- 총사업비: 142억원

(위탁 수수료 713백만원, 조사용역비 및 감정평가 등 1,653백만원, 어업보상비 11,781백만원)

□ 추진상황(보상률 92.6%)

- ʼ19. 2. 14. : 보상업무 위수탁 협약 체결

- ʼ22. 1. 20. : 어업보상업무 위수탁(변경) 협약체결(우도추가)

- ʼ24. 5. : 동부 어업보상업무 정지

※ "월정 공공하수처리시설 증설사업" '24.04.23. 광주고등법원 집행정지 신청 인용 결정(실시계획고시 무효)에 따라 어업피해 보상업무 일시정지

- ʼ24. 6. : 서부 및 육상해수양식장 어업보상 완료

- ʼ24. 8. : 우도 어업보상 완료

※보상현황

보상대상(27)	보상협의		비 고
	협의(25)	미협의(2)
어촌계(해녀) 8개	6	2	∙ 서부 완료('24.06.) ∙ 우도 완료('24.08.) ∙ 동부 정지
동부(월정,김녕), 우도(비양동) 서부(판포,월령,금등,금능,두모)	서부, 우도	월정, 김녕
육상해수양식장 19개	19	-	∙ 양식장 완료('24.06.)
이어도,진보,덕명,고원,대풍,무진,금능도원,초원,신금등,늘푸른,온누리,한경청정,금우,뉴진석,동덕영어,동덕,한림바다목장	이어도수산 등	-

□ 향후 추진계획

- (동부) 실시계획고시가 효력을 갖는 법원판결 후 어업보상 업무 추진

□ 서귀포시 5개 하수처리장

❍ 협약내용

- 5개 하수처리장 용량 증설(74→105천톤) 시 기존 시설 포함 피해조사

- 수탁자 : 한국농어촌공사

- 총사업비: 3,200백만원

(위ㆍ수탁 수수료 1250백만원, 피해조사용역비 및 감정평가 등 1,950백만원)

❍ 추진상황

- ʼ19.5.13. : 보상업무 위·수탁협약체결(수탁사: 한국농어촌공사)

- ʼ19.5.13.~6.12. : 서귀포시 9개 어촌계 어촌계장 및 해녀회장 등 대상 주민설명회 개최

- ʼ19.7.25. : 9개 어촌계 대표 참가 대표회의 개최

- ʼ19.9.~10. : 서귀포시 9개 어촌계와 약정 체결(보목, 하예, 토평, 상모, 하모, 색달, 성산, 태흥2, 태흥3)

- ʼ19.12.17. : 어업피해조사기관(제주대학교 해양과학연구소) / 감정평가기관(대일감정원) 선정

- ʼ20. 1.14. : 어업피해조사 착수설명회 개최

- ʼ20. 3.16. : 어업인대표 측 감정평가기관(중앙감정평가법인) 선정

- ʼ20.11.11. : 어업피해조사 중간설명회 개최

- ʼ21. 7.27. : 어업피해조사 완료

- ʼ22. 1. 5. : 감정평가 및 보상액 산정

- ʼ22. 6. 7. : 서귀포지역 어업피해 보상계획 공고(~ 6.21까지)

※ '23. 8. 31. 기준 : 15개 어촌계 중 10개 어촌계 계약체결 완료

- (계약체결) 10개 어촌계(하예, 색달, 대포, 토평, 서귀, 하효, 상모, 가파, 중문, 보목)

- (미 협 의) 5개 어촌계(하모, 태흥1,2,3리, 성산)   * 사유: 보상비 불만

- 허가어업(어선) 303건 중 283건 협의 완료

- ʼ24. 8. 1. : 서귀포지역 위탁수수료 및 어업피해 보상금 지급 완료(16,264백만원)

❍ 향후 추진계획

- 서귀포지역 하수처리장 인근 어업인들과 지속적인 상생방안 모색

49. 소규모 공공하수처리시설 관리 현황(최근 3년간)

구분	시 설 명	위 치	처리용량 (㎥/일)	설치 년도	연도별 수질초과횟수
					ʼ22년	ʼ23년	ʼ24.8월
1	비양리	협재리 산1-10	30	ʼ03	3	4	4
2	영흥리	추자면 영흥리 2-1	100	ʼ08	52	49	32
3	대서리	추자면 대서리 2	300	ʼ07	52	51	35
4	묵리	추자면 묵리 729	100	ʼ08	47	49	34
5	예초리	추자면 예초리 191-2	45	ʼ09	16	12	8
6	신양리	추자면 신양리 977	100	ʼ09	47	50	32
7	천진리	추자면 신양리 448-6	45	ʼ08	12	11	4
8	우도산호사	우도면 연평리 2589-1	100	ʼ09	52	51	28
9	조일리	우도면 연평리 143	60	ʼ10	49	43	15
10	오봉리 중앙동	우도면 연평리 988-1	40	ʼ04	12	12	7
11	오봉리 하고수동	우도면 연평리 674	45	ʼ03	12	12	5
12	서광리	우도면 연평리 2430-4	100	ʼ17	49	52	33
13	가파도	가파리 533-1	120	ʼ11	42	45	28
14	마라도	가파리 684	80	ʼ02	47	49	34
15	신평리	신평리 1252-1	90	ʼ07	50	44	35
16	좌기동	무릉리 1251-1	50	ʼ10	51	51	32
17	고수동	신흥리 2482	45	ʼ01	3	5	6
18	서의동	남원리 867	40	ʼ01	6	5	6
19	수망리	수망리 1090	70	ʼ04	46	51	29
20	대성동	위미리 1051-4	30	ʼ04	11	6	6
21	월산동	의귀리 2006	30	ʼ05	12	11	5
22	광평리	상천리 산105	10	ʼ04	11	운휴	운휴
23	역지동	가시리 3802	23	ʼ99	11	9	8
24	구룡동	성읍리 3292	120	ʼ11	51	50	34
25	두리동	가시리 2339-3	25	ʼ04	3	5	3
26	세화1리	세화리 1808-3	80	ʼ05	48	52	33

50. 하수처리장 방류수 재이용사업 추진상황 및 향후계획

□ 방류수 재이용 시설현황

재이용시설	재시설용량	사업비	사업기간	수혜면적
서부	5,000㎥/일	55억원	ʼ07.10.~ʼ09.12.	249㏊
동부	5,000㎥/일	57억원	ʼ10.2.~ʼ12.12.	290㏊

□ 하수처리수 재이용수 이용실적

❍ 연도별 재이용수 공급현황(농업용수)

(단위 : 톤/년)

구분	ʼ18년	ʼ19년	ʼ20년	ʼ21년	ʼ22년	'23년	'24.8월	비고
합 계	21,084	6,210	103,483	128,650	133,373	120,987	70,611
서부 (판포)	3,200	3,399	91,122	121,135	130,563	115,589	69,394
동부 (월정)	17,884	2,811	12,361	7,515	2,810	5,398	1,217

❍ 2023년도 월별 공급실적

(단위 : 톤)

시설명	계	서부처리장	동부처리장	비 고
계	121,437	115,589	5,848
1~2월	15,052	13,534	1,518
3~4월	20,832	19,342	1,490
5~6월	16,514	16,514	-
7~8월	16,969	15,986	983
9~10월	33,715	32,904	811
11~12월	17,905	17,309	596
월 평균	10,082	9,632	450

❍ 2024년도 월별 공급실적

(단위 : 톤)

시설명	계	서부처리장	동부처리장	비 고
계	82,176	80,959	1,217
1~2월	15,478	15,478	-
3~4월	26,973	26,973	-
5~6월	27,118	26,943	175
7~8월	12,607	11,565	1042
월 평균	20,544	20,240	130

□ 재이용수 이용률 저하 사유

❍ 극심한 가뭄 또는 갈수기 때만 이용함에 따라 재이용수를 농업용수로 이용률 저하

51. 하수처리장별 근무인력 현황

(단위 : 명)

처리 장명	시설 용량 (천톤/일)	총 인원	일반 행정·기술직							관리 운영 직	청경 및 공무직			비고
			소계	행정	시설	보건	공업	환경	운전
											소계	청경	공무
합계	258	107	50	2	10	1	25	5	7	18	39	8	31
제주	130	44	22	2	5	1	9	3	2	7	15	2	13	현대화 포함
동부	12	11	4	-	-	-	3	1	-	2	5	2	3
서부	24	11	6	-	1	-	3	1	1	3	2	1	1
보목	30	7	7	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	민간 관리 대행 운영
색달	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	민간 관리 대행 운영
대정	21	10	4	-	2	-	1	-	1	2	4	-	4	대정 위생 처리장 포함
남원	8	10	2	-	-	-	1	-	1	3	5	1	4
성산	10	10	4	-	1	-	2	-	1	1	5	1	4	신산 위생 처리장 포함
호근 위생 처리장	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2

52. 하수처리시설 주변 주민숙원사업 추진현황

□ 2023년

(단위 : 백만원)

처리시설명	지원대상마을	사업개요	사업비	추진상황
합 계			9,336
제주하수처리장	도두1동 마을회	주민복지증진사업	80	완료
	신사수 마을회	주민복지증진사업	16	완료
		공동이용시설 보수	70	완료
		태양광 설치 지원사업	340	완료
	효동 마을회	주민복지증진사업	40	완료
	도두 어촌계	주민복지증진사업	70	완료
동부하수처리장	김녕리마을회	마을문화복지공간 조성공사	1,200	추진중
	김녕어촌계	김녕해양문화복지센터 건립사업	1,100	추진중
서부하수처리장	월령리마을회	월령리 새마을회 다가구주택 신축공사	1,000	추진중
	판포리어촌계	판포어촌계 작업장 및 공동 농수산물 판매신축	850	추진중
보목하수처리장	보목마을회	임대주택사업	3,300	추진중
대정하수처리장	하모1리마을회	하모1리 마을살리기 주택임대사업	150	추진중
비양동소규모	비양동새마을회	우도 조일리 비양동 새마을회 마을발전사업	1,120	추진중

□ 2024년

(단위 : 백만원)

처리시설명	지원대상마을	사업개요	사업비	추진상황
합 계			5,202
제주하수처리장	도두1동 마을회	주민복지증진사업	64	추진중
		태양광 설치 지원사업	126	추진중
	신사수 마을회	주민복지증진사업	13	추진중
		공동이용시설 보수	20	추진중
	효동 마을회	주민복지증진사업	32	추진중
	도두 어촌계	주민복지증진사업	56	추진중
동부하수처리장	김녕리마을회	마을문화복지공간 조성공사	500	추진중
	월정어촌계	월정 해녀탈의장 신축사업	1,300	추진중
	월정어촌계	월정게스트하우스 조성사업	800	추진중
	월정리마을회	월정리 어촌해양관광센터 리모델링 사업	50	추진중
	월정어촌계	월정리 어촌계 사무실 리모델링사업	70	추진중
	월정리마을회	구, 월정리마을회관 건물 철거공사	100	추진중
서부하수처리장	월령리마을회	월령리 새마을회 다가구주택 신축공사	414	추진중
		월령리경로당주방 및 다목적실신축사업	500	추진중
보목하수처리장	보목마을회	임대주택사업	500	추진중
대정하수처리장	상모1리마을회	상모1리 주민공동시설 신축공사	50	추진중
남원하수처리장	태흥3리마을회	주민공동시설(다목적회관) 신축 지원사업	330	추진중
	태흥3리어촌계	태흥3리 어촌계 공동시설 정비사업	70	추진중
	태흥2리마을회	태흥2리마을회 주민소득증대 지원사업	22	추진중
비양동소규모	비양동새마을회	우도 조일리 비양동 새마을회 마을발전사업	185	추진중

53. 하수처리장별 방류수 기준 초과 현황(최근 3년간)

연 도	처리장명	초과항목(PPM)			비 고
		항목	기준	초 과
2022년	제주하수처리장	COD	40	40.5 ~ 138.2
		TOC	25	-
		SS	10	10.1 ~ 153.9
		T-N	20	20.0 ~ 40.7
		T-P	2	2.0 ~ 13.9
	동부하수처리장	COD	40	40.1 ~ 124.2
		SS	10	10.1 ~ 236
		T-N	20	20.018
		T-P	2	2.001 ~ 7.472
	서부하수처리장	SS	10	10.6 ~ 49.4
		T-P	2	2.015 ~ 3.503
	보목하수처리장	COD	40	70.8 ~ 115.6
		SS	10	10.4 ~ 340.7
		T-N	20	20.002 ~ 68.259
		T-P	2	2.001 ~ 15.089
	색달하수처리장	COD	40	43.5 ~ 106.3
		SS	10	10.1 ~ 531.2
		T-N	20	20.051 ~ 27.987
		T-P	2	2.001 ~ 4.597
	대정하수처리장	SS	10	11.9 ~ 46.9
		T-P	2	2.203 ~ 3.401
	남원하수처리장	COD	40	40.2 ~ 70.8
		SS	10	10.1 ~ 321.8
		T-N	20	20.014 ~ 84.834
		T-P	2	2.003 ~ 7.031
	성산하수처리장	COD	40	41.4 ~ 102.8
		SS	10	11.0 ~ 140.5
		T-P	2	2.132 ~ 6.958
2023년	제주하수처리장	TOC	25	25.3 ~ 197.9
		SS	10	10.1 ~ 87.5
		T-N	20	20.0 ~ 42.7
		T-P	2	2.0 ~ 12.7
	동부하수처리장	SS	10	10.4 ~ 51.3
		T-N	20	20.028 ~ 26.254
		T-P	2	2.023 ~ 3.900
	서부하수처리장	SS	10	17.8 ~ 49.2
		T-N	20	27.229
		T-P	2	2.262 ~ 2.689
	보목하수처리장	SS	10	10.5 ~ 55.7
		T-N	20	20.197 ~ 28.750
		T-P	2	2.007 ~ 2.874
	색달하수처리장	SS	10	10.4 ~ 18.9
		T-P	2	2.003 ~ 2.865
	대정하수처리장	T-P	2	2.011 ~ 3.026
	남원하수처리장	TOC	25	25.1 ~ 126.9
		SS	10	10.1 ~ 322.9
		T-N	20	20.016 ~ 85.664
		T-P	2	2.009 ~ 8.120
	성산하수처리장	SS	10	13.1 ~ 25.3
		T-P	2	2.066 ~ 3.350
2024. 8월	제주하수처리장	TOC	25	-
		SS	10	10.41 ~ 18.7
		T-N	20	-
		T-P	2	2.0 ~ 3.8
	동부하수처리장	SS	10	10.1 ~ 25.8
		TOC	25	25.2 ~ 25.6
		T-N	20	20.029 ~ 21.843
		T-P	2	2.005 ~ 3.587
	보목하수처리장	T-P	2	2.005 ~ 2.233
	대정하수처리장	T-P	2	2.017 ~ 2.094
	성산하수처리장	SS	10	10.2 ~ 24.1
		T-P	2	2.003 ~ 2.493

※ 유기물질 지표전환(COD→TOC) 및 TOC 수질자동측정기기(TMS) 부착 유예로 2023년 방류수 기준 TOC 적용 시작 (물환경보전법 시행규칙 제34조 배출허용기준, 물환경보전법 시행령 부칙 제30126호. 2019.10.15.)

□ 연간 수질기준 초과 항목별 현황

❍ (2022년)

(단위 : 일)

처리장별	초과일수	COD	SS	T-N	T-P
제주	33	11	26	6	23
동부	101	1	4	42	-
서부	18	-	11	-	7
보목	127	5	29	27	94
색달	182	2	77	5	98
대정	6	-	5	-	1
남원	153	6	44	150	18
성산	12	1	7	-	4

❍ (2023년)

(단위 : 일)

처리장별	초과일수	TOC	SS	T-N	T-P
제주	19	5	11	5	18
동부	34	-	21	2	17
서부	9	-	4	1	4
보목	12	-	9	10	11
색달	6	-	4	-	3
대정	2	-	-	-	2
남원	31	-	27	9	16
성산	4	-	1	-	3

* 초과일수는 연간 총 수질기준 초과일수임(3시간 평균 수치가 연속 3회 기준 초과)

* 수질기준 초과에 따른 설비개선기간 및 강우시 바이패스에 의한 초과일수 포함

❍ (2024년)

(단위 : 일)

처리장별	초과일수	TOC	SS	T-N	T-P
제주	9	-	5	-	6
동부	40	3	25	3	30
서부	-	-	-	-	-
보목	2	-	-	-	2
색달	-	-	-	-	-
대정	1	-	-	-	1
남원	-	-	-	-	-
성산	3	-	2	-	2

54. 하수처리장별 하수발생 및 처리, 처리율 현황(최근 3년간)

(단위 : ㎥/일, %)

구 분		2022년	2023년	2024. 8월	비고
유입발생량 (A)		240,333	251,494	254,351
	제주하수처리장	135,075	139,313	138,213
	동부하수처리장	11,721	11,490	12,837
	서부하수처리장	25,642	27,398	27,621
	보목하수처리장	17,581	19,787	19,250
	색달하수처리장	18,543	19,731	21,982
	대정하수처리장	16,219	18,000	18,905
	남원하수처리장	8,624	8,877	8,973
	성산하수처리장	6,928	6,898	6,570
총시설용량(B)		258,000	266,000	266,000
방류처리량(C)		232,752	242,619	246,098
처리율(%)(C/A)		96.8%	96.5%	96.7%

55. 하수처리장별 하수 슬러지 발생 및 처리현황(최근 3년간)

(단위 : 톤)

연도	처리장별 발생량		처 리 내 역		비고
			자원화시설(복토재)	민간처리(도내·외)
			처리량	처리량
2022	제주	24,236	21,333.27	2,903,12
	동부	3,571.95	-	3,571.95
	서부	8,941.40	-	8950.41
	보목	6,855.33	-	6,855.33
	색달	6,732.06	-	6,732.06
	대정	3,967.75	-	3,967.75
	남원	1,911.97	-	1,911.97
	성산	1,837.28	-	1,837.28
2023	제주	23,512.95	19,789.16	3,723.79
	동부	3,208.6	-	3,208.60
	서부	8,529.22	-	8,529.22
	보목	5,651.8	-	5,651.80
	색달	6,569.22	-	6,569.22
	대정	3,773.71	-	3,773.71
	남원	1,779.95	-	1,779.95
	성산	1,741.93	-	1,741.93
2024. 8월	제주	27,910,52	11,180.22	16,727.30
	동부	2,372.36	-	2,372.36
	서부	5,987.9	-	5987.9
	보목	3,014.83	-	3,014.83
	색달	4,077.03	-	4,077.03
	대정	2,902.38	-	2,902.38
	남원	1,273.05	-	1,273.05
	성산	1,276.77	-	1,276.77

56. 하수 슬러지 자원화 시설사업 운영현황(최근 3년간)

□ 사업개요

□ 위    치 : 제주하수처리장 내

□ 슬러지발생 : 제주시(제주, 동부, 서부)하수처리장

□ 시설규모와 처리방법 : 70톤/일, 건조·고화

□ 위·수탁 현황

- 위탁기간 : ʼ22. 5. 1. ~ ʼ24. 12. 31.

- 위탁비용 : 4,074,600천원/년간

- 수탁기관 : 효성중공업㈜

□ 하수슬러지 처리현황

(단위 : 톤, 천원)

구분	2022년		2023년		2024년		톤당 처리비
	처리량	금 액	처리량	금 액	처리량	금 액
합계	21,333.27	3,271,341	19,789.16	3,448,253	11,180.22	2,335,718
1월	1,970.19	229,736	1,821.08	239,254	1,470.41	290,848	ʼ22년: 153,344원 ʼ23년 : 174,249원 ʼ24년: 208,212원
2월	1,583.28	210,647	1,643.26	289,005	1,094.83	281,030
3월	1,480.38	301,146	1,551.51	257,702	1,333.99	256,517
4월	1,822.86	282,935	1,917.35	298,652	1,441.01	317,472
5월	2,001.18	243,494	1,855.9	294,147	1,410.72	298,377
6월	1,633.07	282,512	1,774.6	331,238	1,484.72	267,899
7월	1,922.53	307,426	1,920.48	259,207	1,646.37	280,558
8월	2,067.35	310,777	1,751.85	251,496	1,298.17	343,017
9월	1,534.91	265,901	1,815.77	336,890	-	-
10월	1,934.81	250,138	1,407.27	348,019	-	-
11월	1,698.20	295,181	1,236.33	279,968	-	-
12월	1,684.51	291,448	1,093.76	262,675	-	-

57. 하수슬러지 민간위탁 추진상황(최근 3년간)

□ 2022년

□ 처리기간 : ʼ22. 1. 1. ~ ʼ22. 12. 31.

□ 위탁처리업체 : ㈜에코비트에너지 정세 + ㈜동양환경, ㈜제이엔이

□ 톤당 처리비

- ㈜에코비트에너지정세 + ㈜동양환경 : 236,000원/톤(운반비 포함)

- ㈜제이엔이 : 196,561원/톤(운반비 포함)

□ 월별 처리현황

(단위 : 톤, 천원)

월별	합 계		제주시지역		서귀포지역		비고
	처리량	처리비	처리량	처리비	처리량	처리비
합계	36,548.03	7,759,250	15,425.48	3,588,931	21,122.55	4,170,319
1월	2,740.71	588,565	740.09	176,882	2,000.62	411,683
2월	2,565.47	543,146	969.93	229,525	1,595.54	313,621
3월	3,628.30	764,279	1,734.57	392,046	1,893.73	372,233
4월	3,984.13	837,231	1,857.64	419,246	2,126.49	417,985
5월	3,600.01	766,347	1,508.95	355,326	2,091.06	411,021
6월	3,370.91	727,328	1,825.87	423,634	1,545.04	303,694
7월	3,238.44	694,481	1,489.97	350,800	1,748.47	343,681
8월	2,829.32	597,238	1,042.21	245,962	1,787.11	351,276
9월	2,654.37	559,905	967.26	228,273	1,687.11	331,632
10월	2,568.16	542,580	957.95	226,076	1,610.21	316,504
11월	2,536.16	536,628	966.51	228,096	1,569.65	308,532
12월	2832.05	601,522	1,364.53	313,065	1,467.52	288,457

□ 2023년

□ 처리기간 : ʼ23. 1. 1. ~ ʼ23. 12. 31.

□ 위탁처리업체

- (제주하수처리장) (유)희성이엔텍+농업회사법인(유)좋은날+농업스마트테크

㈜에코비트에너지정세 + ㈜동양환경

- (제주시 동·서부) 뉴딜영농조합법인, (유)희성이엔텍

- (서귀포지역) ㈜제이엔에이

□ 톤당 처리비

- (유)희성이엔텍+농업회사법인(유)좋은날+농업스마트테크: 235,510원/톤(운반비 포함)

- ㈜에코비트에너지정세 + ㈜동양환경 : 256,500원/톤(운반비 포함)

- 뉴딜 영농조합법인, (유)희성이엔텍 등 : 217,305원/톤(운반비 포함)

- ㈜제이엔이 : 216,000원/톤(운반비 포함)

□ 월별 처리현황

(단위 : 톤, 천원)

월별	합 계		제주시지역		서귀포지역		비고
	처리량	처리비	처리량	처리비	처리량	처리비
합계	34,157.84	7,463,726	14,641.23	3,273,147	19,516.61	4,190,579
1월	2,433.90	501,376	508.39	110,476	1,925.51	390,900
2월	3,127.62	677,320	1,344.13	292,086	1,783.49	385,234
3월	2,730.93	591,169	987.25	214,534	1,743.68	376,635
4월	2,805.13	607,389	1,135.22	246,689	1,669.91	360,700
5월	2,999.60	649,411	1,147.33	249,321	1,852.27	400,090
6월	2,393.07	518,211	1,002.91	217,937	1,390.16	300,274
7월	2,496.91	540,494	890.68	193,549	1,606.23	346,945
8월	2,601.87	563,319	1,007.32	218,896	1,594.55	344,423
9월	2,463.86	537,383	1,155.92	254,868	1,307.94	282,515
10월	2,918.97	654,595	1,462.18	339,928	1,456.79	314,667
11월	3,476.17	778,988	1,939	446,959	1,537.17	332,029
12월	3,709.81	844,071	2060.9	487,904	1,648.91	356,167

□ 2024년

□ 처리기간 : ʼ24. 1. 1. ~ ʼ24. 12. 31.

□ 위탁처리업체

- (제주하수처리장)  ㈜동양환경 + (유)남해환경 + ㈜이엠케이승경

- (제주시 동·서부, 서귀포지역) 옥천영농조합법인, (유)희성이엔텍 외 3

□ 톤당 처리비

- ㈜동양환경 + (유)남해환경 + ㈜이엠케이승경 : 231,000원/톤(운반비 포함)

- 옥천영농조합법인, (유)희성이엔텍 외3 : 229,000원/톤(운반비 포함)

□ 월별 처리현황

(단위 : 톤, 천원)

월별	합 계		제주시지역		서귀포지역		비고
	처리량	처리비	처리량	처리비	처리량	처리비
합계	37,631.68	8,627,388	25,087.63	5,811,078	12,544.05	2,816,310
1월	3,319.65	797,448	2,398.28	597,230	921.37	200,218
2월	5,591.67	1,302,521	3,449.71	837,062	2,141.96	465,459
3월	5,571.94	1,250,197	3,823.1	870,165	1,748.84	380,032
4월	5,204.08	1,186,186	3,518.19	800,117	1,685.89	386,069
5월	5,029.1	1,147,683	3,442.67	784,391	1,586.43	363,292
6월	4,782.19	1,090,418	3,124.24	710,747	1,657.95	379,671
7월	3,936.82	896,387	2,550.01	578,808	1,386.81	317,579
8월	4,196.23	956,548	2,781.43	632,558	1,414.80	323,990

58. 하수처리시설 주변 해역 생태계 보전사업 추진현황

□ 2023년

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	사업기간	사업비	비고
합 계			1,732,000
삼양어촌계 해역생태 보전사업	갯닦이 및 어장오염물질제거	ʼ23.01.~12.	60,000	삼양어촌계
삼양2동 마을회 해안정화 및 마을환경 정비사업	해안정화 및 마을환경 정비사업	ʼ23.01.~12.	12,000	삼양2동 마을회
화북어촌계 해역생태 보전사업	갯닦이 및 어장오염물질제거	ʼ23.01.~12.	20,000	화북어촌계
화북1동 금산마을회 해안정화및마을환경정비사업	해안정화 및 마을환경 정비사업	ʼ23.01.~12.	12,000	화북1동 금산마을회
이호어촌계 해역생태 보전사업	갯닦이 및 어장오염물질제거	ʼ23.01.~12.	28,000	이호어촌계
용담어촌계 해안정화및마을환경정비사업	해안정화 및 마을환경정비사업	ʼ23.01.~12.	11,000	용담어촌계
용담어촌계 수산물종패사업	수산물종패사업	ʼ23.01.~12.	20,000	용담어촌계
동한두기마을회 해안정화및마을환경정비사업	해안정화 및 마을환경정비사업	ʼ23.01.~12.	13,000	동한두기 마을회
월정어촌계 수산물 종패사업	수산물종패사업 1식	ʼ23.01.~12.	12,000	월정리어촌계
판포어촌계 해역생태보전사업	해역생태보전사업	ʼ23.01.~12.	42,000	판포어촌계
판포리마을회 마을가꾸기사업	마을가꾸기사업	ʼ23.01.~12.	24,000	판포리마을회
판포리마을회 주민감시활동 지원사업	해역생태보전사업	ʼ23.01.~12.	30,000	판포리마을회
애월어촌계 수산물종패사업	수산물종패사업	ʼ23.01.~12.	20,000	애월어촌계
월령어촌계 해안정화사업	해안정화사업	ʼ23.01.~12.	20,000	월령어촌계
동귀어촌계 해역생태보전사업	해역생태보전사업	ʼ23.01.~12.	20,000	동귀어촌계
구엄어촌계 수산물종패사업	수산물종패사업	ʼ23.01.~12.	12,000	구엄어촌계
보목동어촌계 해역생태계 보전사업	해양정화 및 해역생태계보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	12,000	보목동어촌계
토평동어촌계 해역생태계보전사업	해양정화 및 해역생태계보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	12,000	토평동어촌계
서귀동어촌계 해역생태계 보전사업	해양정화 및 해역생태계보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	30,000	서귀동어촌계
하예어촌계 해역생태보전사업	해역생태보전사업	ʼ23.01.~12.	25,000	하예어촌계
대평어촌계 어장정화 및 수산물종패사업	어장정화 및 종패사업	ʼ23.01.~12.	25,000	대평어촌계
법환어촌계 어장정화 및 수산물종패사업	어장정화 및 종패사업	ʼ23.01.~12.	40,000	법환어촌계
하모어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	91,000	하모어촌계
상모어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	55,000	상모어촌계
동일리어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	30,000	동일어촌계
동일리마을회 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	12,000	동일리마을회
무릉어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	6,000	무릉어촌계
가파리어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	10,000	가파리어촌계
태흥2리어촌계 주변해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	20,000	태흥2리어촌계
위미2리어촌계 주변해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	20,000	위미2리어촌계
도두 어촌계 해역생태계 보전사업	해안변 청소와 수중정화활동	ʼ23.01.~12.	300,000	도두 어촌계
보목동어촌계 해역생태계 보전사업	해양정화 및 해역생태계보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	12,000	보목동어촌계
토평동어촌계 해역생태계보전사업	해양정화 및 해역생태계보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	12,000	토평동어촌계
서귀동어촌계 해역생태계 보전사업	해양정화 및 해역생태계보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	30,000	서귀동어촌계
하예어촌계 해역생태보전사업	해역생태보전사업	ʼ23.01.~12.	25,000	하예어촌계
대평어촌계 어장정화 및 수산물종패사업	어장정화 및 종패사업	ʼ23.01.~12.	25,000	대평어촌계
법환어촌계 어장정화 및 수산물종패사업	어장정화 및 종패사업	ʼ23.01.~12.	40,000	법환어촌계
하모어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	91,000	하모어촌계
상모어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	55,000	상모어촌계
동일리어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	30,000	동일어촌계
동일리마을회 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	12,000	동일리마을회
무릉어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	6,000	무릉어촌계
가파리어촌계 해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	10,000	가파리어촌계
태흥2리어촌계 주변해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	20,000	태흥2리어촌계
위미2리어촌계 주변해역생태계 보전사업	해역생태계 보전사업 1식	ʼ23.01.~12.	20,000	위미2리어촌계
도두 어촌계 해역생태계 보전사업	해안변 청소와 수중정화활동	ʼ23.01.~12.	300,000	도두 어촌계

□ 2024년

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	사업기간	사업비	비고
합 계			861,400
삼양어촌계 해역생태계 보전사업	해안정화 등 환경정비 1식	ʼ24.01.~12.	42,000	삼양어촌계
삼양2동마을회 해안정화사업	해안정화 및 마을환경 정비 1식	ʼ24.01.~12.	8,400	삼양2동 마을회
화북1동 금산마을회 해안정화사업	해안정화 및 마을환경 정비 1식	ʼ24.01.~12.	9,000	화북1동 금산마을회
화북어촌계 해역생태보전사업	해안정화 등 환경정비 1식	ʼ24.01.~12.	11,200	화북어촌계
용담어촌계 수산물종패사업	홍해삼 종패 1식	ʼ24.01.~12.	14,000	용담어촌계
용담어촌계 해안정화사업	해안정화 등 환경정비 1식	ʼ24.01.~12.	8,800	용담어촌계
이호어촌계 해역생태보전사업	해안정화 등 환경정비 1식	ʼ24.01.~12.	19,600	이호어촌계
용담1동 동한두기마을회 해안정화사업	해안정화 등 환경정비 1식	ʼ24.01.~12.	10,000	용담1동 동한두기 마을회
비양동새마을회 수산물 종패사업	홍해삼 종패 1식	ʼ24.01.~12.	8,400	비양동 새마을회
월정어촌계 해양환경 개선 지원사업	해양환경개선 지원 1식	ʼ24.01.~12.	10,000	월정어촌계
김녕리어촌계 수산물 종패사업	수산물 종패사업 1식	ʼ24.01.~12.	10,000	김녕리어촌계
판포어촌계 해역생태보전사업	해역생태보전사업	ʼ24.02.~12.	38,000	판포어촌계
애월어촌계 수산물종패사업	수산물종패사업	ʼ24.02.~05.	20,000	애월어촌계
월령어촌계 해안정화사업	해안정화사업	ʼ24.03.~12.	18,000	월령어촌계
동귀어촌계 해역생태보전사업	해역생태보전사업	ʼ24.02.~12.	18,000	동귀어촌계
보목동어촌계 해역생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	12,000	보목동어촌계
토평동어촌계 해역생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	24,000	토평동어촌계
서귀동어촌계 해역생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	30,000	서귀동어촌계
하예동어촌계 어장정화 및 수산물종패사업	마을어장 정화 및 수산물 종패	ʼ24.01.~12.	30,000	하예동어촌계
법환동어촌계 어장정화 및 수산물종패사업	마을어장 정화 및 수산물 종패	ʼ24.01.~12.	30,000	법환동어촌계
하모어촌계 해역생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	64,000	하모어촌계
상모어촌계 해역생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	45,000	상모어촌계
동일어촌계 해역생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	25,000	동일어촌계
무릉어촌계 해역생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	6,000	무릉어촌계
가파리어촌계 해역생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	10,000	가파리어촌계
태흥2리어촌계 주변해역 생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	25,000	태흥2리어촌계
위미2리어촌계 주변해역 생태계 보전사업	마을어장 정화	ʼ24.01.~12.	15,000	위미2리어촌계
도두 어촌계 해역생태계 보전사업	해안변 청소와 수중정화활동	ʼ24.01.~12.	300,000	도두 어촌계

59. 제주하수처리시설 현대화사업 추진상황 및 계획

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2027.

❍ 사업규모 : 현대화 22만㎥/일(기존 13만, 증설 9만), 방류관로 1.5㎞ 등

❍ 총사업비 : 4,283억원(국비 2,014, 지방비 2,269)

❍ 사업내용 : 처리시설 완전지하화 및 상부 공원화, 무 중단 공사기법 도입

□ 추진상황

❍ ʼ18. 6월 : 광역하수도정비계획(변경) 승인(환경부)

❍ ʼ19. 1월 : 국가균형발전 프로젝트 선정(기재부, 예타 면제, 국고 50% 반영)

❍ ʼ19. 2월 : 위․수탁 협약 체결(도 ↔ 환경공단)

❍ ʼ19. 9월 : 사업계획 적정성 검토(KDI)

❍ ʼ21. 8. 10. / 9. 13. : 시설공사 입찰공고(2회 - 결과: PQ 무응찰 유찰)

❍ ʼ22. 2. 25. : 시설공사 신규 입찰공고(턴키)

❍ ʼ22. 3. 31.~ 8. 28. : 기본설계

❍ '22. 10. 11.~ '23. 1. 9. : 실시설계

❍ '23. 1.~ '23. 4. : 착공前 주요 인‧허가 등 행정절차 이행

❍ '23. 4. 28. : 시설공사 착공     * 전체 공정율(‘24. 8월말 기준): 13.2%

❍ ʼ24. 7. 15. : 어업피해조사 착수

□ 추진계획

❍ ʼ25. 7. : 어업피해조사 완료 /  ʼ25. 12. : 감정평가 및 보상 완료

❍ ʼ25. 12. : 수처리시설(22만㎥/일) 완공․가동, 해양방류관로 완공

❍ ʼ28. 1. 27. : 시설공사 전체 준공(시운전 6개월 포함)

60. 중수도 관리 현황

60-1. 중수도 시설 전체 현황(규모별 5단계 구분)

□ 규모(톤/일) 별 현황

(단위 : 톤/일, 개소)

구분	합계	1~30톤	30~50톤	50~100톤	100~500톤	500톤 이상	비고
계	54	19	12	13	6	4
제주시	33	16	7	7	1	2
서귀포시	21	3	5	6	5	2

□ 1톤 이상 30톤 미만

시설명	소재지	건축 연면적(㎡)	시설용량 (㎥/일)	예정처리량 (㎥/일)	이용용도	가동여부
제주국제자유도시개발센터 제주첨단리슈빌	제주시 첨단로동길 24(월평동)	32,231	25	25	공업용수	O
제주국제자유도시개발센터 첨단행복주택	제주시 첨단로동길 10(월평동)	56,955	25	25	공업용수	O
제주안전체험관	애월읍 평화로 1885(어음리)	5,381	68.8	28	화장실	O
피커스	제주시 아연로 444-1(오등동)	5,147	20	15.7	화장실, 조경	O
MG제주연수원	제주시 애월읍 평화로 2175(소길리)	5,736	20	20	화장실, 조경	O
신제주연동 트리플시티	제주시 연북로 106(연동)	41,040	40	14	화장실	O
한림수협 다목적 어업인종합지원센터	제주시 한림읍 한림해안로 127(한림리)	6,851	20	16.8	화장실	O
넥스트아일랜드㈜	제주시 우도면 우도해안길 32-24	9,998	330	26.9	조경	O
제주광어 가공·유통센타	제주시 연삼로 166	5,534	25	13	화장실	O
제주푸른병원	조천읍 번영로 957	11,080	25	22.73	화장실, 조경	O
함덕상가	조천읍 함덕리 222-2	3776	30	23	화장실·청소, 조경	X
영평초등학교	제주시 영평동 1826	8,511	7	3.2	조경	O
제주특별자치도 경찰청	제주시 노형동 550	15,837	30	22	화장실	O
청수리공동주택 (트러스트)	제주시 한경면 청수리 963	9,512	20	12	화장실·청소	O
광령리공동주택 (애월지역주택조합)	제주시 애월읍 광령리 2680	28,415	15	15	화장실·청소, 조경, 친수	X
엘크루더퍼스트	제주시 조천읍 함덕리 72-128	4,488	15	12	화장실·청소, 조경	O
제주항공우주박물관	안덕면 녹차분재로 218	30,166	27	27	화장실	O
야크마을	서귀포시 색달중앙로 162	9,337	30	19.1	화장실	O
서귀동 메디컬센터	서귀포시 서귀동 286-1	8,087	20.2	20.2	화장실·청소	X

□ 30톤 이상 50톤 미만

시설명	소재지	건축 연면적(㎡)	시설용량 (㎥/일)	예정처리량 (㎥/일)	이용용도	가동여부
제주방송 연북로지점(J1빌딩)	제주시 연북로 424(도남동)	3,757	50	43.5	화장실·청소, 조경	O
목석원 뜨래별공동주택	제주시 중앙로 628(아라1동)	11,216	40	39.7	화장실·청소, 조경	O
제주 나인몰	제주시 과원로 128	18,949	35	32.2	화장실·청소, 조경	O
호반써밋 제주	제주시 용담이동 481-2	38,147	40.51	40.51	화장실·청소, 조경	X
제주 도련일동 도시형 생활주택	제주시 도련일동 1858	4,175	40	32.9	화장실	X
제주 애월 남해 오네뜨아파트	제주시 애월읍 수산리 2005	7,985	36	35.9	화장실	X
제주 낙천리 테라스하우스	제주시 한경면 낙천리 927	29,688	40	32.8	화장실	X
제주항공우주호텔	안덕면 녹차분재로 216	10,021	45	45	화장실	O
그랜드조선 제주호텔	서귀포시 중문관광로72번길 60	12,727	40	40	조경	O
의료서비스센터	서귀포시 솔오름로 61	8,999	30	30	화장실·청소, 조경	O
제주 시에나리조트	서귀포시 강정동 3703-3	19,966	40	34	화장실·청소, 조경	O
제주 푸르지오 더 퍼스트 아파트	서귀포시 대정읍 구억리 34	24,562	40	36	화장실, 조경	X

□ 50톤 이상 100톤 미만

시설명	소재지	건축 연면적(㎡)	시설용량 (㎥/일)	예정처리량 (㎥/일)	이용용도	가동여부
정부제주지방 합동청사	제주시 청사로 59(도남동)	43,250	60	60	화장실, 조경	O
중앙병원	제주시 월랑로 91(이호이동)	31,129	100	98.4	화장실	O
캠퍼트리호텔앤리조트	제주시 해안마을서4길 100(해안동)	27,068	70	70	조경	O
스누피가든	구좌읍 금백조로 930(송당리)	3,102	60	60	조경, 공업	O
KS컴퍼니㈜	제주시 연북로 511(아라일동)	4,805	50	50	조경	O
솔담한방병원	제주시 1100로 3055(노형동)	4,937	50	50	조경	X
프로젝트 에코/웰컴센터	제주시 애월읍 봉성리 산35	38,124	800	59	화장실, 조경	O
서귀포의료원	서귀포시 장수로 47	23,953	90	90	화장실	O
삼한서비스	토평공단로 107번길 16-4	2,077	100	96	공업	O
신화역사공원 (R지구) 휴양콘도미니엄	안덕면 신화역사로 304번길 139	134,275	250	92.1	조경	O
제주NB 스타빌 글램핑장	안덕면 광평로 34-154	3,961	130	64	화장실, 조경	O
제주양돈축산업협동조합축산물종합유통센터	안덕면 한창로 746-31	10,515	240	85	청소, 세차	O
파르나스호텔	서귀포시 중문관광로72번길 100	43,400	100	81.7	화장실·청소, 조경	O

□ 100톤 이상 500톤 미만

시설명	소재지	건축 연면적(㎡)	시설용량 (㎥/일)	예정처리량 (㎥/일)	이용용도	가동여부
모노리스 제주파크	애월읍 천덕로 880-24(어음리)	12,992	280	280	화장실, 조경	O
휘닉스중앙제주	성산읍 섭지코지로 107	51,076	300	224	화장실, 조경	O
오션스타콘도미니엄	성산읍 섭지코지로 169	48,157	330	330	화장실, 조경	O
부영CC 휴양콘도	남원읍 수망리 1122	30,866	300	300	공업	X
소노인터내셔널 서귀포지점	표선면 일주동로 6347-17	53,052	110	102	조경	O
샤인빌파크 컨트리클럽	표선면 가시로 384	3,961	200	188.1	조경	O

□ 500톤 이상

시설명	소재지	건축 연면적(㎡)	시설용량 (㎥/일)	예정처리량 (㎥/일)	이용용도	가동여부
라온프라이빗타운 (리조트)	한림읍 금능남로 127(협재리)	170,080	1,000	955.6	화장실, 조경	O
제주드림타워	제주시 노연로 12(노형동)	303,737	1,000	1,000	화장실, 조경, 공업	O
신화역사공원 (A지구) PlotA 호텔	안덕면 신화역사로 304번길 38	196,160	1,300	1,300	화장실, 조경, 공업	O
신화역사공원 (A지구) 워터파크	안덕면 신화역사로 304번길 98	13,939	600	600	화장실, 조경, 공업	O

60-2. 중수도 시설 설치 현황(규모별 5단계 구분, 최근 3년간)

□ 규모(톤/일) 별 현황

(단위 : 톤/일, 개소)

구분	합계	1~30톤	30~50톤	50~100톤	100~500톤	500톤 이상	비고
계	20	10	8	2	-	-
제주시	14	8	5	1	-	-
서귀포시	6	2	3	1	-	-

□ 1톤 이상 30톤 미만

시설명	소재지	건축 연면적(㎡)	계획하수량 (㎥/일)	시설용량 (㎥/일)	예정처리량 (㎥/일)	발급번호
제주광어 가공·유통센타	제주시 연삼로 166	5,534	126	25	13	제2022-01호 (2022.2.24.)
제주푸른병원	조천읍 번영로 957	11,080	221	25	22.73	제2022-05호 (2022.05.17.)
함덕상가	조천읍 함덕리 222-2	3776	190	30	23	제2022-06호 (2022.07.22.)
영평초등학교	제주시 영평동 1826	8,511	22	7	3.2	제2022-07호 (2022.09.20.)
제주특별자치도경찰청	제주시 노형동 550	15,837	233	30	22	제2022-08호 (2022.10.31.)
청수리공동주택 (트러스트)	제주시 한경면 청수리 963	9,512	113	20	12	제2023-04호 (2023.08.28.)
광령리공동주택 (애월지역주택조합)	제주시 애월읍 광령리 2680	28,415	136	15	15	제2023-05호 (2023.12.08.)
엘크루더퍼스트	제주시 조천읍 함덕리 72-128	4,488	115	15	12	제2024-01호 (2024.01.05.)
야크마을	서귀포시 색달중앙로 162	9,337	189	30	19.1	제2022-02호 (2022.03.17.)
서귀동 메디컬센터	서귀포시 서귀동 286-1	8,087	201	20.2	20.2	제2024-05호 (2024.02.29.)

□ 30톤 이상 50톤 미만

시설명	소재지	건축 연먼적(㎡)	계획하수량 (㎥/일)	시설용량 (㎥/일)	예정처리량 (㎥/일)	발급번호
제주 나인몰	제주시 과원로 128	18,949	321	35	32.2	제2022-03호 (2022.4.6.)
호반써밋 제주	제주시 용담이동 481-2	38,147	212	40.51	40.51	제2024-02호 (2024.01.29.)
제주 도련일동 도시형 생활주택	제주시 도련일동 1858	4,175	132.1	40	32.9	제2024-04호 (2024.02.22.)
제주 애월 남해 오네뜨아파트	제주시 애월읍 수산리 2005	7,985	163.3	36	35.9	제2024-06호 (2024.05.08.)
제주 낙천리 테라스하우스	제주시 한경면 낙천리 927	29,688	150.2	40	32.8	제2024-07호 (2024.05.10.)
의료서비스센터	서귀포시 솔오름로 61	8,999	135	30	30	제2023-01호 (2023.02.01.)
제주 시에나리조트	서귀포시 강정동 3703-3	19,966	197	40	34	제2023-03호 (2023.04.17.)
제주 푸르지오 더 퍼스트 아파트	서귀포시 대정읍 구억리 34	24,562	155	40	36	제2024-03호 (2024.02.05.)

□ 50톤 이상 100톤 미만

시설명	소재지	건축 연먼적(㎡)	계획하수량 (㎥/일)	시설용량 (㎥/일)	예정처리량 (㎥/일)	발급번호
프로젝트 에코/웰컴센터	제주시 애월읍 봉성리 산35	38,124	753	800	59	제2022-09호 (2022.12.14.)
파르나스호텔	서귀포시 중문관광로72번길 100	43,400	728	100	81.7	제2022-04호 (2022.05.03.)

□ 100톤 이상 500톤 미만

“ 해당사항 없음 ”

□ 500톤 이상

“ 해당사항 없음 ”

60-3. 중수도 시설 점검 현황(최근 3년간)

□ 2022년

❍ (상반기) '22. 5. 30. ~ 6. 30.

구분	점검대상	소재지	점검결과	적용법령
'22년 상반기	라온프라이빗타운 (리조트)	제주시 한림읍 금능남로 127	-	-
	정부제주지방합동청사	제주시 청사로 59	-	-
	제주중앙병원	제주시 월랑로 91	-	-
	캠퍼트리호텔앤리조트 ㈜제주중국성개발	제주시 해안마을서4길 100	-	-
	모노리스 제주파크(주)	제주시 애월읍 천덕로 880-24	-	-
	㈜에스엔가든(스누피가든(테마파크))	제주시 구좌읍 송당리 산166-4,6	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	제주국제자유도시개발센터(임대주택)	제주시 첨단로동길 24	-	-
	제주국제자유도시개발센터(행복주택)	제주시 첨단로동길 10	-	-
	제주안전체험관	제주시 평화로 1885	-	-
	KS컴퍼니 (운동시설 등)	제주시 연북로 511	-	-
	제주솔 (솔담한방병원)	제주시 1100로 3055	원수유입배수관 및 중수 공급펌프 정비 후 정상 가동	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항
	제주드림타워	제주시 노연로 12	-	-
	제주방송 운동시설(카트장)	제주시 연북로 424	중수도 가동 최소 원수 확보 시 가동개시 명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항
	뜨래별 공동주택(연립)	제주시 중앙로 628	중수도시설 미운영에 따른 운영 이행명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제1항, 제28조제3항제4호
	주식회사 제이앤에스(피커스)	제주시 아연로 444-1	-	-
	새마을금고중앙회 연수원	제주시 애월읍 평화로 2175	-	-
	연동 트리플시티	제주시 연북로 106	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	한림수협 다목적 어업인종합지원 센터	제주시 한림읍 해안로 127	-	-
	넥스트아일랜드㈜	제주시 우도면 우도해안길 32-24	-	-
'22년 상반기	제주광어 가공 유통센터	제주시 연삼로 166	-	-
	제주 나인몰	제주시 연동 1454번지 외 4필지	-	-
	푸른병원	제주시 조천읍 와흘리 777번지외 3필지	-	-
	휘닉스중앙제주 (콘도)	서귀포시 성산읍 섭지코지로 107	-	-
	서귀포의료원	서귀포시 장수로 47	-	-
	제주항공우주박물관	서귀포시 안덕면 녹차분재로 218	-	-
	제주항공우주호텔	서귀포시 안덕면 녹차분재로 216	-	-
	제주오션스타콘도미니엄	서귀포시 성산읍 섭지코지로 169	개선(조치)명령 미 이행에 따른 3차 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제8항, 제28조제3항제7호
	삼한서비스 (세탁공장)	서귀포시 토평공단로 107번길 16-4	-	-
	부영CC 휴양콘도	서귀포시 남원읍 수망리 1122	-	-
	신화역사공원 (R지구) 휴양콘도미니엄	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 139	-	-
	신화역사공원 (A지구) PlotA호텔	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 38	-	-
	신화역사공원 (A지구) 워터파크	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 38	-	-
	그랜드조선호텔 (구. 중문관광호텔)	서귀포시 중문관광로 72번길 60	-	-
	소노인터내셔널 서귀포지점	서귀포시 표선면 일주동로 6347-17	-	-
	제주NB 스타빌 글램핑장	서귀포시 안덕면 광평로 34-156	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	제주양돈축산업협동조합 축산물종합유통센터	서귀포시 안덕면 한창로 746-31	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	샤인빌 파크 호텔	서귀포시 표선면 가시로 389	-	-
	색달동 농어촌관광휴양 단지	서귀포시 색달중앙로 162	-	-
	제주 중문특급호텔	서귀포시 색달동 3039-1번지	-	-

❍ (하반기) '22. 12. 14. ~ '23. 1. 6.

구분	점검대상	소재지	점검결과	적용법령
'22년 하반기	라온프라이빗타운 (리조트)	제주시 한림읍 금능남로 127	-	-
	정부제주지방합동청사	제주시 청사로 59	보수 공사 중에 따른 (가동‧보수) 계획서 징구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제7항
	제주중앙병원	제주시 월랑로 91	-	-
	캠퍼트리호텔앤리조트 ㈜제주중국성개발	제주시 해안마을서4길 100	-	-
	모노리스 제주파크(주)	제주시 애월읍 천덕로 880-24	-	-
	㈜에스엔가든(스누피가든(테마파크))	제주시 구좌읍 송당리 산166-4,6	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	제주국제자유도시개발센터(임대주택)	제주시 첨단로동길 24	-	-
	제주국제자유도시개발센터(행복주택)	제주시 첨단로동길 10	-	-
	제주안전체험관	제주시 평화로 1885	-	-
	KS컴퍼니 (운동시설 등)	제주시 연북로 511	-	-
	제주솔 (솔담한방병원)	제주시 1100로 3055	시설 미가동 (가동‧보수) 계획서 징구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제7항
	제주드림타워	제주시 노연로 12	-	-
	제주방송 운동시설(카트장)	제주시 연북로 424	시설 미가동 (가동‧보수) 계획서 징구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제7항
	뜨래별 공동주택(연립)	제주시 중앙로 628	-	-
	주식회사 제이앤에스(피커스)	제주시 아연로 444-1	-	-
	새마을금고중앙회 연수원	제주시 애월읍 평화로 2175	-	-
	연동 트리플시티	제주시 연북로 106	-	-
	한림수협 다목적 어업인종합지원센터	제주시 한림읍 해안로 127	-	-
	넥스트아일랜드㈜	제주시 우도면 우도해안길 32-24	-	-
	제주광어 가공 유통센터	제주시 연삼로 166	-	-
	제주 나인몰	제주시 연동 1454번지 외 4필지	시설 미가동	-
	푸른병원	제주시 조천읍 와흘리 777번지외 3필지	-	-
	함덕상가 (코리아신탁(주))	조천읍 함덕리 222-2	시설 미가동(미분양)	-
'22년 하반기	영평초등학교	영평동 1826번지외 4필지	-	-
	제주경찰청	노형동 550	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	휘닉스중앙제주 (콘도)	서귀포시 성산읍 섭지코지로 107	-	-
	서귀포의료원	서귀포시 장수로 47	-	-
	제주항공우주 박물관	서귀포시 안덕면 녹차분재로 218	-	-
	제주항공우주호텔	서귀포시 안덕면 녹차분재로 216	-	-
	제주오션스타콘도미니엄	서귀포시 성산읍 섭지코지로 169	시설 개선‧보수(조치)명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제8항, 제28조제3항제7호
	삼한서비스 (세탁공장)	서귀포시 토평공단로 107번길 16-4	-	-
	부영CC 휴양콘도	서귀포시 남원읍 수망리 1122	시설 미가동(미분양)	-
	신화역사공원(R지구) 휴양콘도미니엄	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 139	-	-
	신화역사공원(A지구) PlotA호텔	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 38	-	-
	신화역사공원(A지구) 워터파크	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 38	-	-
	그랜드조선호텔 (구. 중문관광호텔)	서귀포시 중문관광로 72번길 60	-	-
	소노인터내셔널 서귀포지점	서귀포시 표선면 일주동로 6347-17	-	-
	제주NB 스타빌 글램핑장	서귀포시 안덕면 광평로 34-156	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	제주양돈축산업협동조합 축산물종합유통센터	서귀포시 안덕면 한창로 746-31	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	샤인빌 파크 호텔	서귀포시 표선면 가시로 389	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제3항, 제28조제3항제5호
	색달동 농어촌관광휴양 단지	서귀포시 색달중앙로 162	-	-
	제주 중문특급호텔	서귀포시 색달동 3039-1번지	-	-

□ 2023년

❍ (점검기간) '23. 11. 28. ~ '23. 12. 22.

구분	점검대상	소재지	점검결과	적용법령
'23년	라온프라이빗타운 (리조트)	제주시 한림읍 금능남로 127	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구, 중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항, 제28조제3항제5호
	정부제주지방 합동청사	제주시 청사로 59	-	-
	제주중앙병원	제주시 월랑로 91	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항, 제28조제3항제5호
	캠퍼트리호텔 앤리조트	제주시 해안마을서4길 100	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	모노리스 제주파크(주)	애월읍 천덕로 880-24	-	-
	㈜에스엔가든 (스누피가든테마파크)	제주시 구좌읍 송당리 산166-4,6	-	-
	제주국제자유도시개발센터(리슈빌)	제주시 첨단로동길 24	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	제주국제자유도시개발센터(행복주택)	제주시 첨단로동길 10	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	제주안전체험관	제주시 평화로 1885	-	-
	KS컴퍼니 (운동시설 등)	제주시 연북로 511	-	-
	제주솔 (솔담한방병원)	제주시 1100로 3055	시설 미가동	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제7항
	제주드림타워	제주시 노연로 12	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항, 제28조제3항제5호
	J1(카트장) (제주방송)	제주시 연북로 424	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항, 제28조제3항제5호
	뜨래별 공동주택(연립)	제주시 중앙로 628	-	-
	주식회사 제이앤에스 (피커스)	제주시 아연로 444-1	-	-
	새마을금고중앙회 연수원	제주시 애월읍 평화로 2175	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항, 제28조제3항제5호
'23년	연동 트리플시티	제주시 연북로 106	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	- 시정요구
	한림수협 다목적 어업인종합지원센터	한림읍 해안로 127	-	-
	넥스트아일랜드㈜ (훈데르트 바서 파크)	우도면 우도해안길 32-24	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	제주광어 가공 유통센터	제주시 연삼로 166	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항, 제28조제3항제5호
	제주 나인몰	제주시 연동 1454번지	-	-
	드림힐요양병원	조천읍 와흘리 777번지외	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항, 제28조제3항제5호
	함덕상가 (코리아신탁(주))	조천읍 함덕리 222-2	시설 미가동(점검불가)	-
	영평초등학교	영평동 1826번지외 4필지	-	-
	제주경찰청	노형동 550	시정필요(시설 도면 보관)	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	프로젝트 에코	애월읍 봉성리 산35번지	-	-
	청수리공동주택	한경면 청수리 963번지외	-	-
	휘닉스중앙제주 (콘도)	서귀포시 성산읍 섭지코지로 107	-	-
	서귀포의료원	서귀포시 장수로 47	-	-
	제주항공 우주박물관	서귀포시 안덕면 녹차분재로 218	-	-
	제주항공우주호텔	서귀포시 안덕면 녹차분재로 216	-	-
	제주오션스타콘도미니엄	서귀포시 성산읍 섭지코지로 169	중수도 용도별 수질기준 초과에 따른 개선명령	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항, 제28조제3항제5호
	삼한서비스 (세탁공장)	서귀포시 토평공단로 107번길 16-4	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	부영CC 휴양콘도	서귀포시 남원읍 수망리 1122	중수도의 시설도면 미보관에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	신화역사공원(R지구) 휴양콘도미니엄	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 139	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
'23년	신화역사공원(A지구) PlotA호텔	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 38	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	신화역사공원(A지구) 워터파크	서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 38	-	-
	그랜드조선호텔 (구. 중문관광호텔)	서귀포시 중문관광로 72번길 60	-	-
	소노인터내셔널 서귀포지점	서귀포시 표선면 일주동로 6347-17	-	-
	제주NB 스타빌 글램핑장	서귀포시 안덕면 광평로 34-156	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	제주양돈축산업협동조합축산물종합유통센터	서귀포시 안덕면 한창로 746-31	-	-
	샤인빌 파크 호텔	서귀포시 표선면 가시로 389	-	-
	색달동 농어촌관광휴양단지	서귀포시 색달중앙로 162	-	-
	제주 중문특급 (파르나스)호텔	서귀포시 색달동 3039-1번지외 9필지	-	-
	의료서비스센터	서귀포시 솔오름로 61	중수도 유지관리 매뉴얼 미배치에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항
	시에나리조트	서귀포시 강정동 3703-3외	중수 사용 표지 미부착에 따른 시정 요구	「물의재이용촉진및지원에관한법률」 제9조제5항

□ 2024년

“ 해당사항 없음 ”

60-4. 중수도 시설 과태료 부과·징수 현황(최근 3년간)

□ 2022년

구분	과태료대상	소재지	과태료 부과금액(원)	납부기한	적용법령
'21년 지도점검	새마을금고 중앙회 연수원	제주시 애월읍 소길리 155-18	1,200,000	'22.02.25.	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조제3항, 제28조제3항
	제주항공우주호텔	서귀포시 안덕면 녹차분재로 216	1,200,000	'22.02.25.
	제주양돈축산업협동조합 축산물종합유통센터	서귀포시 안덕면 한창로 746-31	1,200,000	'22.02.25.
	뜨래별 공동주택 (연립)	제주시 아라1동 1795-1	1,200,000	'22.02.25.	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조제1항, 제28조제3항
	제주 오션스타 레저콘도	서귀포시 성산읍 섭지코지로 169	1,200,000	'22.02.25.	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조제8항, 제28조제3항
	제주 오션스타 레저콘도	서귀포시 성산읍 섭지코지로 169	1,500,000	'22.04.11.	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조제8항, 제28조제3항
'22년 지도점검	(주)에스앤가든	제주시 구좌읍 금백조로 930	1,200,000	'22.08.10.	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조제3항, 제28조제3항
	신제주연동 트리플시티관리단	제주시 연북로 106	1,200,000	'22.08.10.
	씨제이대한통운(주) 클럽나인 브릿지	서귀포시 안덕면 광평로 34-156	1,200,000	'22.08.10.
	제주양돈축산업협동조합축산물종합유통센터	서귀포시 안덕면 한창로 746-31	1,600,000	'22.08.10.
	목석원 뜨래별 관리단	제주시 중앙로 628	1,500,000	'22.08.10.	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조제6항, 제28조제3항

□ 2023년

구분	과태료대상	소재지	과태료 부과금액(원)	납부기한	적용법령
'22년 지도점검	제주양돈농협 축산물종합유통 센터장	서귀포시 안덕면 한창로 746-31	1,200,000	'23.02.17.	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조제3항, 제28조제3항
	에스엔(스누피) 가든 대표	제주시 구좌읍 금백조로 930	1,500,000	'23.02.17.
	나인브릿지 스타빌 대표	서귀포시 안덕면 광평로 34-156	1,200,000	'23.02.17.
	샤인빌컨트리클럽 대표	서귀포시 표선면 가시로 384	1,200,000	'23.02.17.

□ 2024년

구분	과태료대상	소재지	과태료 부과금액(원)	납부기한	적용법령
'23년 지도 점검	드림힐요양병원장	제주시 조천읍 번영로 957	1,200,000	'24.01.22.	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조제3항, 제28조제3항
	오션레져콘도 대표	서귀포시 성산읍 섭지코지로 169	1,200,000	'24.01.22.
	J1카트클럽 대표	제주시 연북로 424	1,200,000	'24.01.22.