2024 행정사무감사
농수축경제위원회

2024. 10

주 요 업 무 보 고

목  차

Ⅰ. 일반현황

1. 기구 및 정･현원

2. 부서별 주요 업무

3. 재정 및 시설 현황

4. 정책목표와 전략

Ⅱ. 2024년 주요업무 추진상황

1. 탄소중립 실현을 위한 풍력자원 개발사업 적기 추진

2. 공공주도 2.0 관리기관 운영체계 구축

3. 제주 에너지대전환을 위한 수소생태계 조성 기반 마련

4. 제주형 분산에너지 사업모델 발굴 및 사업다각화 추진

5. 재정 안정화 및 지역경제 활성화를 위한 EVC 사업 추진

6. 발전단지 안정적 설비 운영 및 효율성 향상 추진

7. 제주형 RE100 확산 및 청정에너지 기반 ESG 경영 강화

Ⅲ. 23년 결산 및 24년도 예산 집행 현황

Ⅳ. 23년 행정사무감사 시정조치결과

Ⅴ. 행정사무감사 요구자료

Ⅰ. 일반현황

Ⅰ. 일반현황

1		기구 및 정 ‧ 현원

❋ 기 구 : 1실 2처 1센터 9부

❋ 인력 : 정원 73명 / 현원 62명

(단위 : 명)

구 분	계	사장	일 반 직						공무직
			1급	2급	3급	4급	5급	6급	5급	6급
정 원	73	1	0	4	9	53			6
현 원	62	1	0	0	3	10	23	19	2	4

*기준일: 2024. 9. 23. **24년 2차 채용에 따른 총 7명(일반 6급 6명, 공무직 6급 1명)증원 완료(24.9.23.일 발령 예정)

2		부서별 주요 업무

부 서		주 요 업 무
혁신 경영실	전략기획부	❍ 대외협력, 경영전략, 재무관리, 조직운영, 성과관리, 예산관리 등
	ESG경영부	❍ ESG경영, 고객만족, 홍보 ❍ 인사관리, 노경상생, 보상관리, 복리후생
	총무부	❍ 회계결산, 계약관리, 지출업무 ❍ 재산 및 물품관리, 정보화, 경영지원 등
그린 에너지 발전 사업처	관리기관 운영부	❍ 공공주도 2.0 관리기관 운영 ❍ 국책과제 수행 (8MW 부유식 해상풍력)
	청정에너지 개발부	❍ 한동평대, 보롬왓 등 공공주도 육·해상풍력 개발사업 추진 ❍ 동복·북촌풍력발전단지 확장사업, 리파워링 등 추진 ❍ 태양광 발전사업, 관련 도 대행사업 수행
	발전운영 사업부	❍ 신재생에너지발전설비 운영·관리 ❍ 발전단지 안전관리 총괄
미래 에너지 사업처	분산에너지 사업부	❍ EVC 사업 추진 및 운영관리 ❍ BESS, VPP 등 분산에너지 신규사업 추진
	청정수소 사업부	❍ 행원 3.3MW 수전해 설비 실증 ❍ 그린수소 생산설비 상용화 운영계획 수립 및 생산 ❍ CFI에너지미래관 운영
청정에너지연구센터		❍ 국책 연구사업 연구･기획 추진 ❍ 도 에너지 정책 컨설팅 등
열린감사부		❍ 감사·감찰, 청렴·윤리경영, 법무지원, 전사 안전관리 업무 등

3		재정 및 시설 현황

❍ 자본금 : 1,306.5억원(제주특별자치도 현물출자 100%)

수권자본금		설립자본금		납입자본금
500,000백만원		8,063백만원		130,653백만원

※ ΄12.11.23. 김녕, 가시리 풍력발전단지 현물출자로 583억원 증자

※ ΄19.11.01. 공사 풍력발전단지 인근 토지 현물출자로 643억원 증자

❍ 재무구조

(단위 : 백만원)

연 도	자 산	부 채(A)	자 본(B)	차입 부채 (누적액)	부채비율 (A/B, %)	비 고
2013년	72,669	3,667	69,002	0	5.31
2014년	91,461	19,645	71,816	16,300	27.35
2015년	129,766	57,138	72,628	55,000	78.67
2016년	127,959	53,758	74,201	50,520	72.45
2017년	123,542	47,805	75,737	43,021	63.12
2018년	117,354	39,144	78,210	31,355	50.05
2019년	175,074	30,753	144,321	26,562	21.31
2020년	166,254	22,924	143,330	21,250	15.99
2021년	162,214	18,219	143,994	15,938	12.65
2022년	165,105	14,880	150,225	10,624	9.91
2023년	157,241	7,434	149,807	5,312	4.96

❍ 2024년도 예산 *24년 1차 추가경정예산 기준

(단위 : 백만원)

수 입			지 출
구분	2024년	비고	구분	2024년	비고
합계	36,172		합계	36,172
상품판매수익	16,490		행정운영활동	7,825
대행사업수수료수익	122		재생에너지사업	7,894
기타영업수입	50		탄소중립사업	6,426
이자수익	249		국책,대행사업	4,384
기타영업외수익	4,735		대외소통강화 및 조직 활성화	59
유동부채수입	5,015		영업외활동	1,734
자본잉여금수입	1,300		재무활동	5,312
순세계잉여금	8,211		예비비	2,538

❍ 신재생에너지 시설 현황 (기준일 : 2024. 8. 31.)

구 분		규 모	준공년도	비 고
풍 력 발 전	계	55,330㎾(38기)
	행 원	7,880㎾(7기)	2000년 ~ 2013년
	신 창	1,700㎾(2기)	2006년
	김 녕	750㎾(1기)	2010년
	가 시 리	15,000㎾(13기)	2012년
	동복·북촌	30,000㎾(15기)	2015년
태양광 발 전	계	2,500㎾
	행 원	415.2㎾(1식)	2010년
	제주종합경기장	490㎾(1식)	2016년
	교 래	496.8㎾(1식)	2018년
	CFI에너지미래관 주차장	99.7kW(1식)	2018년
	수 산	998.4kW(1식)	2022년
BESS 시 설	계	27,221㎾h
	동복·북촌	18,000㎾h(1식)	2016년
	가 시 리	9,000㎾h(1식)	2016년
	CFI에너지미래관 주차장	221kWh(1식)	2018년
EV 충전 설비	CFI에너지미래관 주차장	4기(7ch)(1식)	2018년
송 전 선 로	계	32.42㎞
	행 원 ~ 성산변전소	24.5㎞	2003년
	가시리 ~ 표선변전소	6.15㎞	2012년
	동 복 ~ 조천변전소	1.77㎞	2015년

❍ CFI에너지미래관 운영 현황

- 위    치	: 제주시 구좌읍 해맞이해안로 712-3 일원

- 사 업  비	: 70억 원(국비 36억 원, 지방비 24억 원, 기금 10억원)

- 건설기간	: ‵08. 1. ~ ‵10. 5. (개소 : ‵10. 4. / 현물출자[도→에너지공사] : ‵12.12.)

- 규     모	: 건축물 1,719㎡(연면적 2,467㎡, 지상 2층)/부지 25,306㎡

- 주요시설	: 신재생에너지 전시 홍보시설, 교육공간, 4D영상관, 에너지 소통공감카페 등

- 연도별 이용 현황(‵24 8. 31. 기준)

연 도	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022	2023	2024
관람인원(명)	30,547	33,149	29,773	22,151	16,720	6,130	2,591	12,228	12,532	7,082

* 코로나19 확산에 따른 휴관 실시(‵20. 2. 25. ~ 6. 18.(3개월 간) 휴관)

** 코로나19 확산 및 리모델링에 따른 휴관 실시(‵20. 12. 23.~‵21. 5. 26.(5개월 간) 휴관)

4		정책목표와 전략

경 영 슬 로 건		H2 JECO (Harmonious and Happy Better JECO)
미 션		분산에너지 수용 확대 및 청정에너지 전환을 통한 제주 탄소중립 실현 기여
비 전		청정에너지로 에너지 전환을 선도하는 친환경 에너지 공기업
핵 심 가 치		미래지향	혁신중심		안전존중		지속성장
경 영 방 침		탄소중립 친환경 에너지원을 위한 미래지향		지역을 향한 산·학·연·관의 상생협력		도민과의 소통으로 사회적가치 창출

전략목표		전략과제
청정에너지 경쟁력 확보		❍ 청정에너지 개발 사업 추진 ❍ 그린수소 밸류체인 구축 ❍ 청정에너지 R&D 역량 강화
친환경기반 신성장사업 선도		❍ 분산에너지 수용 인프라 구축 ❍ 신성장사업 발굴 및 확대 ❍ 환경에너지 사업기획 및 확대
효율기반 경영혁신체계 구축		❍ 효율기반 경영관리 체계 구축 ❍ 소통/협력기반 조직문화 조성 ❍ 신뢰 중심 고객서비스 혁신
ESG 책임경영 강화		❍ ESG 경영 내재화 ❍ 인권 및 안전관리체계 고도화 ❍ ESG 경영을 통한 사회적 책임 강화

Ⅱ. 2024년 주요업무 추진상황

1		탄소중립 실현을 위한 풍력자원 개발사업 적기 추진

	ㅇ 공공주도 해상풍력 첫 모델 가시화를 위한 사업 시행 단계 진입 ㅇ 풍력발전의 공공적 관리와 개발이익 공유화로 지역경제 활성화		`
	추진 목표	·(한동·평대) 공동개발협약 및 장기고정계약 체결 ·(동복확장) 풍력발전지구 지정 추진 ·(보 롬 왓) 사업자 공모 및 사업시행협약 체결

한동·평대 해상풍력사업

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: (개발) ‵16. 1. ~ ‵26. 12. (건설) ‵27. 1. ~ ‵29. 6.

ㅇ 사업위치: 제주시 구좌읍 한동리·평대리 일원(해상)

ㅇ 총사업비: 약 5,900억 원

※ 공사 출자 예정금액: 59억 원, 지분율 10% (타인자본 5,310억 원)

ㅇ 사업규모: 105㎿급

□ 추진상황

ㅇ 풍력발전지구 지정 도의회 동의 및 고시: ‵18. 2.

ㅇ 타법인 출자 도의회 동의(‵20. 4.) 및 해역이용협의 완료(‵20. 5.)

ㅇ 환경영향평가서 협의 내용 도의회 동의 완료: ‵21. 12.

ㅇ 사업자 공모 및 우선협상대상자(동서발전 컨소시엄) 선정: ‵23. 5. ~ 10.

ㅇ 우선협상대상자 협상 및 사업시행협약 체결: ‵23. 10. ~ 12.

ㅇ 사업이행보증(총사업비 10%) 및 대표사업자 지정 완료: ‵24. 1. ~ 2.

ㅇ 개발사업 시행승인 신청기한 연장(기한: ‵25. 7. 31.): ‵24. 3.

ㅇ 공동개발(104MW급)협약 주요사항 법률 검토 및 마을 협의 진행 중: ‵24. 4. ~

□ 추진계획

ㅇ (공사, 컨소시엄) 공동개발협약 체결: ~ ‵24. 10.

ㅇ (공사, 컨소시엄) 한국에너지공단 고정가격계약 입찰 참여: ~ ‵24. 12.

ㅇ (공사, 컨소시엄) 주주협약체결 및 특수목적법인(SPC) 설립: ~ ‵25. 4.

ㅇ (SPC) 건설공사 착공 및 준공/상업운전 개시: ‵27. 1. ~ ‵29. 6. / ‵29. 6.~

동복풍력 발전단지 확장사업

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: (개발) ‵21. 12. ~ ‵25. 12. (건설) ‵26. 1. ~ ‵26. 12.

ㅇ 사업위치: 제주시 구좌읍 동복리 산 56번지(공유지) 일대

ㅇ 총사업비: 약 410억 원

ㅇ 사업규모: 약 20MW급(기존 시설: 30MW)

□ 추진상황

ㅇ 동복리 주민대상 사업설명회 실시(6회) 및 마을총회 승인: ‵22. 1. ~ 5.

ㅇ 기본 및 실시설계용역 착수: ‵23. 6. ~ ‵25. 6.

ㅇ 재해영향성 검토 및 재해영향평가 용역 착수: ‵23. 6. ~ ‵25. 6.

ㅇ 제24-1차 도 경관위원회 심의 완료(조건부 의결): ‵24. 1.

ㅇ 산지전용타당성조사 및 문화재청 협의(문화재지표조사) 완료: ‵24. 2.

ㅇ 공유재산 영구시설물 축조 도의회 동의(원안가결) 완료: ‵24. 2.

ㅇ 풍력발전지구 지정(변경) 신청서 작성 완료 및 道 협의 중: ‵24. 4. ~

ㅇ 구좌읍 공유재산(일반재산) 대부계약 체결 완료: ‵24. 5.

□ 추진계획

ㅇ 소규모 환경영향평가 용역 발주 및 계약: ~ ‵24. 10.

ㅇ 지구지정(변경) 심의 및 도의회 동의 및 고시: ~ ‵24. 12.

ㅇ 도시계획시설결정(변경) 심의 및 고시: ~ ‵25. 6.

ㅇ 전기사업허가 및 개발사업시행 승인: ~ ‵25. 12.

ㅇ 건설공사 착공 및 준공/상업운전개시: ‵26. 1. ~ ‵26. 12. / ‵26. 12. ~

행원(보롬왓) 육상풍력사업

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: (개발) ‵16. 1. ~ ‵26. 6. (건설) ‵26. 7. ~ ‵27. 6.

ㅇ 사업위치: 제주특별자치도 구좌읍 행원리 산 30번지 일원

ㅇ 총사업비: 약 660억 원

※ 공사 출자예정금액: 53억 원, 지분율 40% (타인자본 528억 원)

ㅇ 사업규모: 약 21MW급

□ 추진상황

ㅇ 행원리새마을회/목장회 임시총회 사업 재추진 안건 승인: ‵18. 7.

ㅇ 풍력발전지구 지정 도의회 동의 및 고시: ‵21. 4.

ㅇ 소규모환경영향평가서 협의 완료: ‵21. 9.

ㅇ 재해영향성검토서(행정단계) 협의 완료: ‵21. 12.

ㅇ 도시관리계획 결정 고시 완료: ‵23. 8.

ㅇ 사업자 공모 기본계획(안) 수립: ‵23. 12.

ㅇ 사업자 공모지침서 작성 및 법률 검토: ‵24. 1. ~ 4.

ㅇ 사업자 공모 관련 주민 의견수렴 및 실무협의회 협의 추진 중: ‵24. 4.~

□ 추진계획

ㅇ (공사) 사업자 공모 및 우선협상대상자 선정: ~ ‵25. 5.

ㅇ (공사) 사업시행협약 협상 및 협약 체결: ~ ‵25. 7.

ㅇ (공사) 타 법인 출자 도의회 동의 및 특수목적법인(SPC) 설립: ~ ‵26. 2.

ㅇ (SPC) 전기사업 허가 및 개발사업시행 승인: ‵26. 6.

ㅇ (SPC) 건설공사 착공 및 준공/상업운전 개시: ‵26. 7. ~ ‵27. 6. / ‵27. 7. ~

2		풍력자원의 공공적 관리와 속도감 있는 사업 추진을 위한 공공주도 2.0 관리기관 운영체계 구축

	ㅇ 신속한 사업 추진으로 공공주도 2.0 정책 실현 및 청정에너지 확대 기여 ㅇ 공공성 사전검토 절차 운영 및‘공정·상생 풍력개발 세부지침’도입으로 공공성 강화 및 환경훼손 차단·최소화
	추진 목표	·관리기관 운영계획 수립 및 공정·상생 풍력자원 개발 세부지침 제정 ·공공성 사전검토를 통한 후보지 발굴

□ 추진개요

ㅇ 사업위치: 제주특별자치도 전 해역

ㅇ 사업규모: 주민수용성을 확보한 대규모 해상풍력 후보지 2개소 내외

ㅇ 주요내용: 공공주도 2.0 공공성 사전검토 단계 이행

- 제3차 풍력발전종합관리계획에 따른 사업우선순위(후보지) 선정

- 대규모 해상풍력발전사업 사업개발계획 수립 및 사업자 공모

- 소규모 풍력발전사업 공공성 사전검토

□ 추진상황

ㅇ ‘道 풍력자원 공공적 관리기관’지정: ‵23. 12.

ㅇ 관리기관 공공주도 2.0 풍력자원개발 기본계획 수립: ‵24. 4.

ㅇ 관리기관 운영계획 및 세부지침 수립 및 보고: ~ ‵24. 4.

ㅇ 공공주도 풍력개발사업 의견청취 공고 및 도민설명회 실시: ‵24. 5. ~ 6.

ㅇ 수망 소규모풍력 공공성 사전검토 및 마을방문 설명 완료: ‵24. 5. ~ 6.

ㅇ 주민수용성 향상을 위한 마을별 소통 상담소 운영: ‵24. 7. ~ 8.

ㅇ 후보지(우선순위) 2차 검토 및 입지 지도 컨설팅 신청: ‵24. 8. ~ 9.

□ 추진계획

ㅇ 공공주도 2.0 주민수용성 확대 가이드라인(2단계 마을동의 검토중) 마련: ‵24. 10.

ㅇ 주민설명회 개최 및 마을 총회 통한 주민수용성(1단계) 확보: ‵24. 10.

ㅇ 공공주도 2.0 사업개발계획 수립: ‵24. 12.

3		제주 에너지대전환을 위한 수소생태계 조성 기반 마련

	ㅇ 공사 기술혁신을 통한 에너지 전문기관(수소전문기업)으로 자리매김하여 제주 에너지 산업의 경쟁력 제고 및 질적 성장 견인 ㅇ 제주 청정수소 정책 지원, 연구 실증, 신규 국책과제 유치 등 수소경제 활성화 도모
	추진 목표	·(에너지전문기관) 전국 최초 지방공기업 수소 전문기관 등록 추진 ·(3.3MW 그린수소 생산) 수전해 생산설비 준공 및 전국 최초 상용화 체계 구축 ·(10.9MW 그린수소 상용화) 도시관리계획 입안 등 인허가 추진

에너지 전문기관으로서 정책 지원 추진

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: ‵24. 1. ~ ‵25. 12.

ㅇ 총사업비: 70백만원

ㅇ 추진방법: 정부 ․ 지자체 정책 수립 참여 및 제도 개선

ㅇ 주요내용

- 도 에너지전환, 탄소중립, 수소육성 등 에너지 정책 참여

- 재생에너지 출력제어 분석을 통한 청정수소 수급 전망 분석

- 경제성 확보를 위한 청정수소 인증 및 전력시장 정책 개선 건의

- 정부 에너지 계획, 관련 법률 등 제도 개선 추진

□ 추진상황

ㅇ (정부) 30MW 청정수소 실증 기술개발 기획 참여 및 제주 유치: ‵23. 7.

ㅇ (정부) 11차 전력수급기본계획(제주 수급 소위) P2G 효과분석 제출: ‵23. 11.

ㅇ (제주) 재생에너지 출력제어 및 청정수소 수급 전망 분석: ‵23. 11.

ㅇ (정부) 수소 예비특화단지 사전기획 수요 조사 제출: ‵24. 5.

ㅇ (정부) 섹터커플링 활용 방안과 제도개선 방안 수립 및 건의: ‵24. 6.

ㅇ (제주) 에너지대전환 시나리오 제도개선 건의: ‵24. 6.

ㅇ (제주) 수소경제 육성 기본계획 수립용역(에너지대전환 마스터플랜) 참여: ‵24. 7. ~

ㅇ (정부) RE100 기반 수소 시범단지 실증대상지 지자체 공모 참여 및 선정: ‵24. 8.

□ 추진계획

ㅇ 재생에너지 출력제어 및 청정수소 수급 전망 연구: 계속

ㅇ 수소전문기업(산업통상자원부) 신청 및 선정: ~ ‵24. 12.

ㅇ (RIS사업) 그린수소 고도화, 분산에너지 기술개발 수행: ~ ‵25. 2.

ㅇ 제주 수소경제 육성 기본계획(에너지대전환) 수립용역 수행: ~ ‵25. 3.

[국책사업] 3.3MW 그린수소 생산 및 저장 기술 개발

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: ‵20. 10. ~ ‵24. 9.(48개월)

ㅇ 총사업비: 약 226억 원(국비 135억 원, 지방비 17억 원, 민간 74억 원)

ㅇ 참여기관: 에너지공사(주관), 道, 한국가스공사 외 8개 기관

- 국내최초 MW(3.3MW)급 수전해 시스템 설계, 구축 및 실증

- 그린수소(600kg) 생산 및 배터리(2MWh) 저장 시스템 구축 및 실증

□ 추진상황

ㅇ 도시관리계획 최종 결정 고시 및 건축신고 승인: ‵22. 3 ~ 8.

ㅇ 고압가스 일반제조 허가 완료: ‵22. 12.

ㅇ 수전해 시스템 및 출하 설비 등 안착: ‵23. 3.

ㅇ 그린수소 생산플랜트 한국가스안전공사 완성검사 및 준공: ‵23. 6.

ㅇ 수소 생산 시운전 및 수소 품질 검사 합격: ‵23. 8.

ㅇ 사업 개시 신고 및 수소 생산 실증·운영 실시: ‵23. 9. ~

ㅇ 해외 1MW PEM 수전해 시스템 완성검사 및 품질검사 합격: ‵24. 5.

□ 추진계획

ㅇ 과제 종료에 따른 상용화 운영 실시: ‵24. 10. ~

ㅇ 안정적 생산 시스템 구축을 위한 압축설비 증설 추진: ‵24. 10. ~

[국책사업] 10.9MW 재생에너지 연계 대규모 그린수소 개발

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: ‵22. 4. ~ ‵26. 3.(48개월)

ㅇ 총사업비: 약 561억 원(국비 267억 원, 민간 294억 원)

ㅇ 참여기관: 한국남부발전(주관), 에너지공사, 道 외 11개 기관

ㅇ 주요내용

- 국내 최대 10.9MW급, 국내외 타입별(4type) 수전해 설비 설치와 운영

- 新전력시장 요금제도(PPA, 플러스DR 등) 활용한 그린수소 생산 및 상용화를 위한 경제성 확보 방안 마련

Power Purchase Agreement의 약자로, 발전사업자가 생산한 전력을 한전을 통하지 않고 직접 거래하는  전력 판매 방식

잉여전력이 발생할 것으로 예상되는 시간에 전력을 사용하여 잉여전력문제를 해소하는 수요반응 제도

□ 추진상황

ㅇ (공사) 실증부지 최적 후보지 도출(23. 6), 마을 동의 및 부지 확정: ~ ‵23. 11.

ㅇ (공사, 컨소시엄) 주민 수용성 확보 활동(수소 선진지 시찰 등): ~ ‵23. 12.

ㅇ (컨소시엄) 실증 후보지 내 상세 위치(부지) 확정: ~‵24. 7

ㅇ (컨소시엄) 정부예산 삭감에 따른 기관별 예산 및 용량 변경: ~‵24. 7

ㅇ (공사) 그린수소 사업 부지 인허가 사항 사전 검토(협의): ~‵24. 8

ㅇ (공사, 컨소시엄) 특별평가 및 사업계획서 변경(12.5MW→10.9MW) 완료, 협약 변경 진행 중

□ 추진계획

ㅇ (공사, 컨소시엄) 협약 변경 체결 및 수행기간 연장 체결: ~ ‵24. 11.

ㅇ (컨소시엄) 부지 측량 등 현황 조사 및 배치 기본설계 완료: ~ ‵24. 12.

ㅇ (공사) 용도지역 변경 및 도시관리계획 결정 제안서 입안: ~ ‵24. 12.

ㅇ (공사) 도시계획위원회 심의 및 도시관리계획 결정 완료: ~ ‵26. 1.

ㅇ (컨소시엄) 실시설계 및 실시계획 인가, 건축 허가 완료: ~ ‵26. 3.

ㅇ (컨소시엄) 완성검사 및 준공, 시운전 실시: ‵26. 4. ~

[국책사업] RE100 기반 수소 시범단지 인프라 기술 개발

□ 추진개요

ㅇ 사업명: RE100 기반의 수소 시범단지 인프라 기술 개발

ㅇ 사업기간: ‵22. 4. ~ ‵26. 12.(57개월)

ㅇ 총사업비: 약 370억 원(국비 268억 원, 도비 40억 원, 민간 62억 원)

ㅇ 전담기관: 국토교통과학기술진흥원(국토교통부 산하기관)

ㅇ 참여기관: 한국에너지기술연구원(주관) 외 10개 기관(협의 중)

ㅇ 주요내용

- 3.3MW 그린수소 생산시설 연계 운영을 통한 안정적 수소 생산 및 공급

- 재생에너지의 간헐성 극복을 위한 단주기(전력) 및 장주기(수소) 에너지 저장과 ICT기술 활용 에너지 균질화 및 RE100 달성 기술 개발

- 국산화 수소 생산·저장·발전기술 개발 및 BESS 활용 융복합 인프라 실증·운영

ㅇ 주요설비(안): 1MW급 수전해, 560kg급 수소 저장탱크, 압축기, 8MWh급 BESS, 0.7MW급 연료전지, 통합운전제어시스템, 출하설비 등

□ 추진상황

ㅇ (에기연) 실증 대상지 지원 지자체 모집 공고: ‵24. 7.

ㅇ (도, 공사) 공모 신청서 및 제안서 제출: ‵24. 7.

ㅇ (도, 공사) 서면평가 및 현장평가: ‵24. 7.

ㅇ (에기연) 우선협상대상 지자체 선정 통보: ‵24. 8.

※ 실증 대상지: 행원풍력발전단지 내 공사 소유 부지

□ 추진계획

ㅇ (주관기관-도, 공사) 1, 2차 실무 협상 추진: ‵24. 9.

ㅇ (도, 국토부, 에기연) 업무협약 체결: ‵25. 9.

ㅇ (공사, 도, 컨소시엄) 합의각서 체결: ‵25. 10.

ㅇ (컨소시엄) 인허가 확보 및 설비 구축: ~ ‵25. 12.

ㅇ (컨소시엄) 시운전 및 실증·운영: ~ ‵26. 12.

4		제주형 분산에너지 사업모델 발굴 및 사업다각화 추진

	ㅇ 新 전략시장에 대응하기 위한 제주형 분산에너지 사업모델을 발굴하여 출력제어 완화와 잉여전력을 활용한 신성장 동력 확보
	추진 목표	·(VPP 개발 및 실증) 통합 EMS 개발 완료 Virtual Power Plant의 약자로, 분산되어 있는 다양한 에너지자원을 하나의 통합된 운영시스템(가상 발전소)를 통해 관리하는 방식 Energy Management System의 약자로, VPP를 운영·관리하기 위한 수단으로 다양한 에너지자원에 대한 통합 제어, 관리 및 모니터링 체계를 말함 ·(BESS 구축) 발전사업허가 취득 및 SPC 출자 도의회 승인 Battery Energy Storage System의 약자로, 전기에너지를 배터리에 저장, 방전을 통해 전력 사용의 유연성을 확보할 수 있는 수단 ·(P2H 실증) 플러스 DR 연계 실증운영 착수 Power To Heat의 약자로, 전력 과잉생산 시 잉여전력을 히트펌프 등 열에너지로 전환하여 수요처에 공급

[국책사업] VPP통합플랫폼, ISO-DSO 협력체계 운영시스템 개발

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: ‵23. 4. ~ ‵26. 12.(45개월)

ㅇ 사업비: 208억 원(국비 122억 원, 민간 86억 원)

ㅇ 참여기관: 에너지공사(주관) 외 13개 기관(도내 8개 공공/민간 참여)

ㅇ 주요내용

- VPP(가상발전소)-DSO(배전망운영자)-ISO(독립계통운영자) 협조‧운영체계 구축을 위한 기술‧제도‧규정 개발

- 실시간 전력시장 대비 공급형, 혼합형, 수요형 VPP 통합모델 개발

- VPP 통합자원 통합관제 및 전력시장 실시간 대응 운영시스템 개발

□ 추진상황

ㅇ‘VPP-DSO-ISO간 협조‧운영시스템 개발’과제 최종 선정: ‵23. 5.

ㅇ 다양한 자원 모집이 가능한 통합 EMS 공동 개발 협약체결(한전KDN): ‵23. 11.

ㅇ 정부예산 구조개혁으로 변경협약 체결: ‵24. 4.

ㅇ 통합 EMS 구축을 위한 보안 설명회 완료: ‵24. 6.

ㅇ VPP 연계용 BESS 구축 검토 및 계획 수립 완료: ‵24. 8.

ㅇ 통합 EMS 구축을 위한 보안성 검토 심의 요청: ‵24. 9.

ㅇ VPP 연계용 BESS 설계 및 인허가 추진 중

□ 추진계획

ㅇ 통합 EMS 구축을 위한 보안성 심의 대응 완료: ~ ‵24. 10.

ㅇ VPP 연계 BESS 전기사업 허가 신청 및 획득: ~ ‵24. 11.

ㅇ VPP 연계 BESS 건축허가 및 개발행위허가 완료 : ~ ‵24. 12.

ㅇ 통합 EMS 구축 완료: ~ ‵25. 6.

ㅇ 국책과제 3 ~ 4차년도 업무 수행 :‵25. 1.~ ‵26. 12.

중앙계약시장 장주기 BESS 구축사업

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: (건설) ‵23. 12. ~ ‵25. 9. (운영) ‵25. 9.부터 15년간

ㅇ 총사업비: 약 1,200억 원 이내

ㅇ 설비용량: PCS 36MW, BAT 205MWh

ㅇ 추진방법: 특수목적법인(SPC) 설립 후 추진

ㅇ 주요내용

- 전력거래소(KPX) 사업자 공모 선정으로 국내 최초 중앙급전방식 BESS 사업추진

- 도내 전력계통 현황에 따라 BESS 충·방전운영으로 재생에너지 출력제어량 약 38.8% 저감 예상

- SPC 지분 중 공공부문(공사, 발전공기업) 지분을 50% 이상으로 구성하여 사업의 공공성 확보

□ 추진상황

ㅇ (공사, 컨소시엄) 사업 참여를 위한 컨소시엄 구성: ‵23. 5.

ㅇ (산업부, KPX) 제주 장주기 BESS 중앙계약시장 사업 사업자 입찰공고: ‵23. 8.

ㅇ (공사, 컨소시엄) 공동개발 협약체결 및 사업자 입찰 참여 및 선정: ‵23. 11.

ㅇ (공사, 컨소시엄) BESS 발전사업허가 취득: ‵24. 4.

ㅇ (공사) 특수목적법인(SPC) 출자 타당성 검토 용역: ~ ‵24. 4.

ㅇ (공사, 컨소시엄) BESS 전력거래 계약체결: ‵24. 5.

□ 추진계획

ㅇ 특수목적법인(SPC) 출자 도의회 승인: ‵24. 11.

ㅇ 사업 인허가 추진(개발행위허가, 공사계획인가 등): ~ ‵25. 1.

ㅇ BESS 구축 착공 및 준공: ‵25. 2.

ㅇ 특수목적법인(SPC) 출자 재원 확보 및 출자: ‵25. 2.

ㅇ BESS 준공 및 상업 운전 개시: ‵25. 9.

[국책사업] P2H(Power to Heat) 실증사업

□ 추진개요

ㅇ 과제명: 재생에너지 출력제한(Curtailment)을 이용한 P2Heat 기술 개발

ㅇ 사업기간: ‵22. 4. ~ ‵25. 12.(45개월)

ㅇ 총사업비: 93억 원(국비 74억 원, 민간 19억 원)

ㅇ 참여기관: 에너지공사(주관), 제주대학교, 한화에너지 외 5개 기관

ㅇ 주요내용

- 잉여전력과 지하수 열을 활용하여 온·냉열 에너지로 전환하는 기술개발

- 도내 실증사이트 3개소 구축 및 플러스DR 연계 실증 운영

실증분야	농업시설	축산시설	관광시설
	서부농업기술센터	애월아빠들	한화리조트
설비용량	250RT(879kWH)	50RT(176kWH)	150RT(527kWH)

※ RT(Refrigeration Ton, 냉동톤): 단위시간당 냉각열량(kcal/h), 1kW=0.2843RT

□ 추진상황

ㅇ (예산조정) 예산조정에 따른 연구계획 변경 및 협약 체결: ~ ‵24. 4.

ㅇ (농업시설) P2H 실증시스템 준공 완료 및 시운전: ~ ‵24. 8.

ㅇ (축산시설, 관광시설) P2H 시스템 기본설계 완료: ~ ‵24. 8.

□ 추진계획

ㅇ 플러스DR 전용 플랫폼 구축 및 모니터링 시스템 구축: ~ ‵24. 10.

ㅇ (농업시설) 전력거래소 연계 플러스DR 적용 실증운전: ‵24. 10. ~

ㅇ (축산시설, 관광시설) P2H 시스템(공기열) 착공: ‵24. 9. ~

ㅇ (축산시설, 관광시설) P2H 시스템(공기열) 시운전: ‵25. 1. ~

5		재정 안정화 및 지역경제 활성화를 위한 EVC 사업 추진

	ㅇ 신규사업 추진을 통한 단기 매출 향상과 도내기업 원도급 참여율 극대화로 지역경제 활성화에 기여 ㅇ 행정시와의 협업을 통한 도민서비스 질적 향상 추진
	추진 목표	·(전기차) 전기차 급속충전기 14기 구축 ·(전기버스) 전기버스 충전기 17기 구축

전기차 충전기 구축사업

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: ‵23. 9. ~ ‵24. 12.

ㅇ 총사업비: 6.4억 원

ㅇ 사업규모: 전기차 급속충전기(50㎾급 이상) 14기 구축

ㅇ 주요내용: 양 행정시와 협력으로 시너지 효과 기대

- (공사) 첫 자체 충전 인프라 구축 사업 추진 단기 수익원 확보

- (행정시) 안정적인 충전 인프라 구축 및 운영으로 대민 서비스 강화

□ 추진상황

ㅇ 사업부지 발굴 및 사업타당성 검토 완료: ‵23. 3. ~ 5.

ㅇ 공사 EV충전기 구축사업 계획 수립: ‵23. 8.

ㅇ 사업 협업 제안, 공유재산 사용허가, 영구시설물 축조 동의 (공사↔市) : ‵23. 8. ~ 12.

ㅇ 공유재산 사용 허가(제주시, 서귀포시→ 공사): ‵24. 1.

ㅇ 전기공사 실시설계 용역: ‵24. 1. ~ 3.

ㅇ 전기공사, 충전기 구매, 감리용역 발주: ‵24. 3. ~

ㅇ 제주시 3개소(동문재래, 칠성골, 인제) 4기 구축 완료: ‵24. 7.

* 제주시 1개소 민원 발생, 서귀포시 2개소 한전 공사로 인한 지연(10기 구축예정): ‵24. 7. ~

□ 추진계획

ㅇ 민원 및 한전 협의를 통한 조속한 공사 재개: ‵24. 10.~

ㅇ 충전기 구축 준공 및 상업운전 개시: ~ ‵24. 12.

전기버스 충전기 구축사업

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: ‵24. 6. ~ ‵24. 12.

ㅇ 총사업비: 34억 원

ㅇ 사업규모: 전기버스 충전기(220㎾급) 17기 구축

ㅇ 주요내용: 道와의 협업을 통한 전기버스 충전기 사업 추진

- (공사) 신규 사업을 통한 단기 수익 창출 & 전력 수요자원 관리로의 사업영역 확장

- (道) 공익을 우선하는 공기업과의 협업을 통해 도민 생활과 밀접한 생활 서비스인 친환경버스 보급으로 도민들에 양질의 서비스 제공

□ 추진상황

ㅇ 전기버스 충전기 사업계획 수립: ‵24. 5.

ㅇ 전기버스 충전기 사업 협업 제안(공사 → 道): ‵24. 5.

ㅇ 전기버스 회차지 충전기 구축 검토 요청(道 → 공사): ‵24. 5.

ㅇ 투자심의 위원회 심의 및 이사회 사업 승인 의결: ‵24. 6.

ㅇ 전기버스 충전기 전기공사 실시설계 착수: ‵24. 7.

ㅇ 공유재산 사용 허가 및 영구시설물 축조 동의: ‵24. 9.

□ 추진계획

ㅇ 전기버스 충전기 구축 개발행위 허가: ‵24. 10.

ㅇ 충전기 구매, 전기공사, 감리용역 추진: ‵24. 10.~

ㅇ 충전기 구축 준공 및 상업운전 개시: ~ ‵25. 1.~

6		발전단지 안정적 설비 운영 및 효율성 향상 추진

	ㅇ 발전단지 근로자 및 협력업체와의 소통 강화로 안전사고 예방 ㅇ 발전설비 품질관리 및 운영시스템 고도화로 발전단지 효율 향상
	추진 목표	·(안전관리) 안전보건협의체·중대재해예방위원회 12회 개최 ·(품질관리) 가동률 향상 계획 수립 3건, 가동률 92.8% 달성 ·(운영관리 고도화) 원스톱 안전관리 및 운영실적 분석시스템 도입

□ 추진개요

ㅇ 사업기간: ‵24. 1. ~ 12.

ㅇ 주요내용

- (안전관리) 안전보건협의체 ․ 중대재해예방위원회 운영을 통한 안전 사항 공유, 수급인 ․ 도급인 의견 청취

- (품질관리) 적기 유지보수 및 예비자재 조기 확보 체계 마련, 고장유형 분석 및 예방점검 강화

- (운영관리 고도화) 계획․허가서 등 원스톱 안전관리 및 운영실적 영향 분석시스템 도입

□ 추진상황

ㅇ 안전보건협의체·중대재해예방위원회 8회 개최: ‵24. 1.~ 8.

- 안전사고예방 안건 총 16건 논의(12건 조치완료, 4건 조치예정)

ㅇ 발전설비 예방정비(300건), 상반기 정기점검(36기)을 통한 안정적 설비 운영: ‵24. 1.~ 8.

ㅇ 안전·실적관리 시스템 분석 및 플랫폼 고도화 방안 검토: ‵24. 1.~ 8.

ㅇ 대한산업안전협회 무재해 운동 목표 3배수(1,638일) 달성: ‵24. 7.

□ 추진계획

ㅇ 안전보건협의체 ․ 중대재해예방위원회 운영: ~ ‵24. 12.

ㅇ 발전단지 정기적 유지보수 및 예비자재 사전 확보: ~ ‵24. 12.

ㅇ 안전·실적관리 플랫폼 고도화 개발: ~ ‵24. 12.

ㅇ 풍력설비 노후화에 따른 설비관리 개선방안 수립: ‵24. 9.~12.

7		제주형 RE100 확산 및 청정에너지 기반 ESG 경영 강화

	ㅇ 협업을 통한 공공기관 RE100 달성을 시작으로 RE100 기업 유치 지원 ㅇ 청정에너지 홍보 강화를 통한 도민사회 수용성 및 친밀도 증진 ㅇ 청년 포함 사회형평적 채용, 사회공헌 사업 등 책임경영 강화
	추진 목표	·공공기관 RE100 달성을 위한 PPA방식 태양광 사업 추진 ·에너지 정책(에너지대전환, 분산에너지, 그린수소 등) 홍보 추진 ·취업 취약계층을 위한 사회형평적 채용 1명 실시 ·사회공헌 네트워크 활용 지역밀착형 사회공헌 지속 추진

□ 추진방향

ㅇ 공공기관 유휴부지 활용 태양광 사업으로 제주형 RE100 달성 기반 마련

ㅇ 급변하는 에너지 정책에 대한 도민 사회 수용성 제고를 위해

온/오프라인(유튜브, 미래관 리모델링 등) 홍보 활성화 추진

ㅇ 사회형평적 채용, 에너지 복지 등 사회공헌 사업 지속 추진

□ 추진상황

ㅇ 공사 특화 사회공헌계획 수립 및 이행

- 한국사회복지협의회‘지역사회공헌 인정기관’추진 중: ‵24. 7. ~

- 학교 숲 조성 및 예술단체 결연 후원 등 사회공헌사업 추진 중

ㅇ ESG경영 본격 추진을 위한 ESG경영부 신설: ‵24. 7. ~

- 공사 ESG 경영위원회 운영지침 제정(‵24. 1.) 및 위원회 위촉(‵24. 8.)

ㅇ 에너지대전환 정책 홍보콘텐츠 강화를 위한 CFI에너지미래관 리모델링 완료: ‵24. 9.

ㅇ 도내 공공기관 협력을 통한 RE100 확산 추진

- (관광공사) RE100캠핑(‵24. 10.예정) 공동행사 기획 중, 35백만원 추경 확보: ‵24. 7.

- (개발공사) 실무협의회 구성(‵24. 8.) 및 삼다수 취수원 부지 활용 태양광 설치 및 PPA 검토 중

- (ICC) RE100 관광시설 구축 업무 협약 완료: ‵24. 5

ㅇ ‵24년 상반기 채용계획 수립 및 채용완료(정규직 2명, 대행사업인력 4명)

ㅇ ‵24년 하반기 직원 채용 중(정규직 11명)

□ 추진계획

ㅇ 24년 사회공헌 추진계획에 따른 사회 공헌 지속 추진: ~ ‵24. 12.

ㅇ 공공기관 협업 제주형 RE100 인프라 구축: ~ ‵24. 12.

ㅇ ESG 중장기 경영전략 수립 및 실행: ~ ‵24. 12.

ㅇ 청년일자리 및 사회 형평적 채용 확대를 위한 인력 운용 실행: ~ ‵24. 12.

Ⅲ. 23년 결산 및 24년 예산 집행 현황

23년 결산 및 24년 예산 집행 현황

❑ 23년 결산 내역

❍ 수입

(단위 : 천원)

구 분		예산액	결산액	수납액
계		43,709,084	47,261,517	45,681,997
수익적 수입	영업수익	20,003,724	20,278,206	18,820,260
	영업외수익	2,220,368	2,632,800	2,511,225
자본적 수입	유동부채수입	8,489,737	8,279,785	8,279,785
	자본잉여금수입	-	-	-
	유보자금	10,908,314	13,983,785	13,983,785
	기타자본적수입	-	-	-
이월재원 수입	이월금	2,086,941	2,086,941	2,086,941

❍ 지출

(단위 : 천원)

구 분		예산액	결산액	지출액
계		43,709,084	34,874,887	34,811,382
수익적 지출	영업비용	12,626,027	11,340,503	11,283,810
	영업외비용	3,713,544	3,563,482	3,563,482
	법인세등	2,640,000	2,628,666	2,628,666
예비비		2,030,512	-	-
자본적 지출	투자자산	-	-	-
	유형자산취득	2,557,713	1,624,202	1,624,202
	무형 및 기타비유동자산	256,412	138,889	138,889
	유동부채상환	8,489,737	7,231,908	7,225,096
	비유동부채상환	5,312,468	5,312,468	5,312,468
	기타자본적지출	1,000,000	1,000,000	1,000,000
예비비		2,995,730	-	-
이월예산 지출		2,086,941	2,034,769	2,034,769

❑ 24년 예산 집행 현황(8. 31. 기준)

(단위 : 천원)

구 분		예산현액*	지출액	집행률(%)	비 고
합 계		36,172,537	13,456,128	37.2
사 업 예 산		18,734,608	8,759,453	46.8
	영업비용	14,198,102	7,164,463	50.5
	영업외비용	2,838,225	1,485,156	52.3
	법인세등	160,000	109,833	68.6
	예비비	1,538,281	-	-
자 본 예 산		17,437,929	4,696,674	26.9
	투자자산	-	-	-
	유형자산	5,882,734	506,894	8.6
	무형자산	27,700	25,003	90.3
	유동부채상환금	5,015,027	1,438,543	28.7	대행사업 국책과제
	비유동부채상환금	5,312,468	2,656,234	50.0
	기타자본적지출	200,000	70,000	35.0
	예비비	1,000,000	-	-

Ⅳ. 23년 행정사무감사 시정조치결과

2023년 행정사무감사 시정조치결과

1		현황

(2024년 8월 말 현재)

소관별	추 진 상 황				비고
	계	완 결	추진중	추진불가
제주에너지공사	3	3	-	-

2		목록

(2024년 8월 말 현재)

연번	시정 및 처리 요구사항	추진상황
1	풍력발전기 유지관리 기술 및 기술인력 확보 부실	완결
2	입지조사 용역 참여업체 사업자 공모시 선정기준 마련 철저	완결
3	제주에너지공사 사업추진 철저	완결

3		행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항

1. 풍력발전기 유지관리 기술 및 기술인력 확보 부실

처리결과

완결 ( √ ),  추진중 (   ),  추진불가 (   )

□ 추진상황

1. 발전설비 유지보수 및 관리 기술 확보방안

- 전문 기술력 향상 및 확보를 위한 공사 주도의 교류회 및 교육실시

- 대외 교육기관을 활용한 전문기술 및 안전교육 실시

구분	일시	주요내용	참여인원
기술 교류회	΄23. 6. 14.	·풍력발전기 기종별 고장발생 및 고장대응 사례 등 공유 - 풍력발전기 릴레이 점검 방법 및 점검 키트 시연 - 풍력발전기(HS50, U50) 요 브레이크 패드 교체 - 행원 5호기(HJWT1500) 기어박스 고장 사례 - 진동측정진단 기술 및 행원 5호기 적용 사례	총 24명 공사직원 9명 한전 2명 도내업체 12명 도외업체 1명
	΄23. 10. 27.	- 동복 한진기종(HJWT2000) PCS 진단기술 - ACB 보호계전기 테스트 및 NETA 장비 교체 - 효성기종(HS50) 제너레이터 엔토더 고장 기술	총 23명 공사직원 12명 제주대 2명 도내업체 10명
	΄24. 4. 26.	·풍력발전기 기종별 고장발생 및 고장대응 사례 등 공유를 통해 안전사고 예방 및 기술력 향상 - 가시풍력(HJWT1500) Safety Chain Open 고장수리 기술 - 동복풍력(HJWT2000) ISU LCL TEMP Fault 대응 개선방안 - 풍력발전 윤활유(그리스, 오일) 유지보수 방안	총 23명 공사직원 10명 도내업체 8명 도외업체 5명
고장 대응 공유 발표회	΄23. 3. 24.	·공사 내부직원 및 도내외 중소기업 대상으로 풍력발전기의 고장 대응 방법 및 기술력 향상 추진 - 동복 한진기종(HJWT2000) 제너레이터 고장 대응 - 한진기종(HJWT2000) PCS 크로우바 고장 대응 - 신창 V52 PT100 센서 관련 고장 대응	총 21명 공사직원 11명 제주대 3명 도내업체 7명
	΄23. 9. 27.	- 동복 한진기종(HJWT2000) 로터브레이크 고장 대응 - 동복 한진기종(HJWT2000) Emergency Pitching 고장 대응 - 행원연안(winds) 기어박스 이상소음 고장 대응	총 17명 공사직원 10명 도내업체 7명
전문 교육	΄23. 3. 29.	·22.9kV 패드변압기 절연저항 측정법 및 누유 검사교육 - 패드변압기 유지보수 매뉴얼 - 패드변압기 절연저항 측정 매뉴얼 - 패드변압기 절연저항 측정 및 누유 검사 현장실습	총 17명 공사직원 10명 도내업체 7명
	΄23. 7. 28.	·중고장 사전예방을 위한 심각도 분류법 교육 - 블레이드 결함 기준 교육 - 결함 종류 및 구성 요소 교육 - 데이터 플랫폼 활용 관리 방법 교육	총 21명 공사직원 12명 제주대 2명 도내업체 7명
	΄23. 11. 16.	·풍력 관련 기술과 수소최신동향 및 기술 교육 - 풍력 기술, 플랫폼 및 솔루션 교육 - 풍력발전 계측기 관련 교육 - 세계 수소시장동향 및 플렌트 현황, 벨류체인 교육	총 17명 공사직원 7명 도내업체 10명
	΄23. 11. 20. ~ 24.	·풍력발전사업장 안전보건관리체계 기본 교육	총 27명 공사직원 3명 유관기관 24명
	΄23. 12. 14. ~ 15.	· Windpro와 WaSP을 활용한 발전단지 설계 및 시뮬레이션	총 3명 공사직원 3명
	΄24. 2. 29.	- 매듭법(Girth Hitch 등)을 활용한 수공구 운반법 및 유의사항 - 풀리시스템을 활용한 수공구 운반용 등하강기 사용법 및 유의사항	총 20명 공사직원 8명 도내업체 12명
	΄24. 5. 28.	· 도내‧외 중소기업 및 공사 내부 직원을 대상으로 전문교육을 실시하여 신재생에너지 전문성 향상 - 제주 전력계통 및 출력제어 현황 및 대응방안 - 풍력발전기 윤활유 Q&A(24년 1차 기술교류회 환류)	총 41명 공사직원 24명 도내업체 12명 도외업체 5명
풍력 기술 학교 시범 운영	΄23. 8. 16. ~ 25.	·풍력 에너지변환 이론, 안전작업, 기계·전기설비 진단, 트러블슈팅, 블레이드 유지보수, 진동측정분석 등 60시간 교육 실시	총 8명 공사직원 6명 도내업체 1명 대학원생 1명

2. 전문(기술)인력 확보 및 유지 노력

- 임금체계 현실화(하위직급 임금체계 개편 중점) 및 사내복지기금 도입 등 공사 임직원 처우 개선

☞ ‵23년 실효성 있는 임금체계 개편으로 애사심 및 임직원 사기진작

☞ 사내복지기금 도입으로 공사 임직원 복지 개선

- 공사 정원의 효율적 관리 및 운영

☞ 효율적인 인력운영 및 사업을 위한 13명 증원 및 조직개편 완료로 전문 기술인력 확보 추진

□ 향후계획

1. (내부교육) 발전설비 유지보수 및 관리 기술 확보를 위한 교육 지속 추진

2. (외부전문교육) 한국발전인재개발원, 전기기술인협회 등 외부 전문교육기관 활용 교육 지속 추진

담당부서

제주에너지공사 발전운영사업부 (☎ 070-4924-2254)

ESG경영부 (☎ 720-7433)

시정 및 처리요구사항

2. 입지조사 용역 참여업체 사업자 공모 시 선정기준 마련 철저

처리결과

완결 ( √ ),  추진중 (   ),  추진불가 (   )

□ 사업자 공모지침서 추진경과

❍ 한동평대 해상풍력 조성사업 입지조사 및 기본설계 용역: ‘16. 10. ~

❍ 한동평대 해상풍력 조성사업 입지조사 및 기본설계 용역 과업 변경(개발 사업 투자 공모지침서 작성 추가): ‘17. 10.

❍ 1차 사업자 공모지침서 작성: ‘19. 12.  *전체 용역 완료: ‘20. 1.

❍ 공정성 강화를 위한 법률 검토 시행: ‘19. 10. ~ ‘20. 3.

- 2개사 법무법인 교차 법률 검토를 통해 공정성 훼손에 대한 정밀 검토 완료

❍ 2차 사업자 공모지침서 작성(공사 내부TF): ‘22. 6.

❍ 공모절차의 공공성과 공정성을 더욱 강화하는 평가기준을 반영한 3차 공모지침서 작성(공사 내부TF): ‘23. 5.

- 3차례 공모지침서 수정 및 변경으로 특정업체가 참여한 컨소시엄이 유리한 평가지표 ZERO화

(공모결과) 공모 참여한 컨소시엄에서 공정성에 대한 이의제기·민원발생 없음

□ 향후계획

□ 공모지침서 작성 용역 추진 시 공고문에“용역수행 업체는 사업자 선정시 배제”된다는 유의사항을 명시하여 입찰 추진

□ 사업자 공모 시, 참가자격에“공모 지침서 작성용역에 참여한 사업자”는 제외 대상임을 명시 후 추진

담당부서

제주에너지공사 청정에너지개발부 (☎ 720-7462)

시정 및 처리요구사항
3. 제주에너지공사 사업 추진 철저
처리결과	완결 ( √ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진방향 □ 기 추진 사업(육해상풍력, 수소, 분산에너지 등) 분야에 대한 원활한 추진으로 사업 다각화 및 단기 수익원 발굴 □ 현안사업 중심의 해결을 위한 내 ․ 외부(혁신산업국-공사)소통강화를 통한 대응계획 수립 철저 □ 공사 주요 사업 관련 주요 현안사항 및 추진경과 □ 하루전 실시간 전력입찰시장 도입 - 전력시장 개편에 따른 ｢제주 시범사업｣ 검토 보고: ‵23. 8. - VPP국책과제 활용 실시간 전력시장 대응 운영시스템 개발: ‵23. 4. ~ - 전력시장 제도개선 제주시범사업 참여 계획 수립: ‵23. 12. - 동복, 가시리, 행원 중개사업자(LG에너지솔루션)와 계약체결 완료 □ 공공주도 2.0 관리기관 지정 - 공공주도 2.0 관리기관 지정: ‵23. 12. - 공공주도 2.0 관리기관 운영관련 사전협의 3회 실시: ‵24. 1. - 공공주도 2.0 운영계획 및 세부지침 수립: ‵24. 4. □ 3.3MW 그린수소 실증단지 운영 및 수소 생산 - 수소 생산 시운전 및 수소 품질 검사 실시(합격): ‵23. 8. - 사업개시 신고 및 수소 생산 실증 ․ 운영 실시: ‵23. 9. ~ - (조치사항) 그린수소 생산시설 운영 기본계획 수립: ‵23. 9. - 해외 수전해 시스템 완성검사 및 품질검사 합격: ‵24. 5. □ 향후계획 □ (연중) 현안사업별 운영계획(안) 수립에 따른 도 협의 및 적기 이행
담당부서	제주에너지공사 전략기획부 (☎ 720-7422)