2026년도 지방채 발행한도액 초과 발행계획안

제주특별자치도

2026년도 지방채 발행한도액 초과 발행계획안

의안번호	2800	제출연월일: 2025. 10. . 제 출 자: 제주특별자치도지사

1. 제안 이유

○ 침체된 지역경제 활성화 및 건설경기 부양을 위하여 장기미집행 도시계획시설(도로, 공원) 토지보상과 공사 및 중․장기 재정투자사업의 추진 등을 위한 적극 재정으로 발행한도액을 초과하여 지방채 발행이 필요한바,

○「지방재정법」 제11조,「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 및 2026년도 지방채 발행계획 수립기준(행정안전부) 등의 규정에 따라 “2026년도 지방채 발행한도액 초과 발행계획안”을 제안하는 것임

2. 주요 내용

○ 2026년도 지방채 발행 한도액은 3,840억 원(별도한도 1,048억 원 포함)으로,

○ 2026년도 지방채 발행계획은 147건·4,820억 원(지역개발채권 320억 원 포함)임

· 지역개발채권 320억 원

· 중․장기 투자계획에 의한 재정투자사업을 위해 2,206억 원

· 장기미집행 도시계획시설(도로, 공원) 토지보상 723억 원

· 장기미집행 도시계획시설(도로, 공원) 공사비 571억 원

· 상하수도 사업을 위해 1,000억 원을 발행할 계획임

○ 향후 적정한 채무관리를 위하여

· 지방채 발행은 2028년까지 관리채무비율을 21% 이내로 관리하고

· 순세계잉여금의 30% 이상을 재정안정화기금에 적립하여 지방채 원리금 상환에 활용할 계획이며

· 세수결손 등 재정여건 변동 시 지방채 발행을 탄력적으로 운영하겠음
※추후 필요 시 지방채 발행계획 변경(안) 제출

2026년도 지방채 발행한도액 초과 발행계획안

◈ 장기 미집행 도시계획시설 보상 및 공사 등 경기부양을 위한 적극 재정 재원 충당

◈ 중·장기 투자계획에 의한 재정투자사업의 계획성 있는 추진을 위한 차입선 확보

Ⅰ	발행계획 수립 근거

❍「지방재정법」 제11조~제12조, 같은 법 시행령 제7조~제12조

❍ 행정안전부 “2026년 지방채 발행계획 수립기준”(2025. 7.)

Ⅱ	기본방향

□ 건설경기 장기침체 극복 및 경기부양을 위한 지방채 발행 적극 확대

❍ 중․장기 재정투자의 효과성과 시급성, 도민 수혜도를 고려하여 대상사업 선정

❍ 기(旣) 지방채 발행계획 예정사업의 안정적 추진 기반 조성

□ 합리적 채무관리 5개년 계획의 운영 및 채무건전성 확보

❍ 채무건전성을 위한 관리채무비율 20%이내 조기환원 적극 추진

Ⅲ	지방채 발행계획(안)

□ 지방채 발행한도액                                   (단위: 억 원)

구 분			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 한도액 (A+B)			4,261	3,582	4,211	4,137	3,840
	총 발행액 (a+b)		3,228	1,400	2,400	2,600	4,820
	기본 한도액 (A)		2,556	2,642	3,585	2,973	2,792
		발 행 액 (a)	1,523	460	1,774	1,436	4,029
	별도 한도액* (B)		1,705	940	626	1,164	1,048
		발 행 액 (b)	1,705	940	626	1,164	791

* 별도한도액: 지역개발공채발행액 + 장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 지방채     (단위: 억 원)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026
계	1,705	940	626	1,164	791
지역개발공채	612	400	400	400	320
장기미집행 도시계획시설(공원)	1,093	540	226	764	471

□ 지방채 발행계획(안)  *지역개발채권 발행분(320억 원) 제외

❍ 총괄규모: 4,500억 원                                                (단위: 억 원)

구 분	2026년	2025년	증감	증감률	비 고
합 계	4,500	2,200	2,300	104.54%
도	1,835	1,302	53	4.07%	상하수도 1,000
제주시	1,347	479	868	181.21%	장기미집행 679
					구분	보상	공사
					도로	87	332
					공원	252	8
서귀포시	1,318	419	899	214.55%	장기미집행 615
					구분	보상	공사
					도로	165	231
					공원	219	-

❍ 차입선별 발행계획                                                   (단위: 억 원)

구 분		2026년	2025년	증감	비 고
					차입선	상환(거치)	이율
차입금		4,500	2,200	2,300
	공공자금 관리기금	338	338	-	기획 재정부	10(5)	3.123% (2024. 4분기)
	지역개발 지원금	57	57	-	한국지방 재정공제회	5(2)	한은기준금리+0.5
	지역상생 발전기금	144	144	-	지역상생 발전조합	8(2)	한은기준금리+0.25
	주택도시 기 금	-	-	-	주택도시 보증공사	7년만기 일시상환	1.95% (2024. 4분기)
	금융기관 자금	3,961	1,661	2,300	금융기관	차입시점 별도 협의

❍ 사업별 발행내역                                                      (단위: 백만원)

구 분			사업명	26년 투자계획			발 행	비고
				소계	국비	도비
합 계(146건)				892,594	198,206.5	694,387.5	450,000
	도본청		소 계(27건)	573,932	161,761	412,171	183,500
		소통청렴담당관	(가칭)제주자치지원센터 신축공사	5,313		5,313	900
		통상물류과	제주 스마트공동물류센터 조성	7,120	3,560	3,560	3,500
		미래성장과	서귀포시 수소충전소 구축사업	7,500	4,200	3,300	1,900
		우주모빌리티과	사용후 배터리 자원화 통합센터 구축	2,000	1,000	1,000	1,000
		노인복지과	도 노인복지지원센터 건립	11,656		11,656	11,300
		환경정책과	곶자왈 도민자산화 사업	1,300		1,300	1,300	공공자금 관리기금
		환경정책과	하논분화구 핵심구역 사유지 매입	2,000		2,000	2,000
		자원순환과	신규 광역 폐기물소각시설 설치사업	9,556	4,778	4,778	4,700
		건설과	제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	5,500	500	5,000	5,000	공공자금 관리기금
		주택토지과	원도심 지역 빈집정비 사업	2,500		2,500	2,100
		주택토지과	공공주택 건립 부지 매입	9,980		9,980	9,900
		15분도시과	15분도시 시범지구 생활필수기능시설 조성	10,800		10,800	10,800
		문화정책과	지역거점형 콘텐츠기업지원센터 조성	9,320	4,660	4,660	2,900
		친환경농업정책과	농업용수 노후관로 정비 사업(균특이양)	3,000		3,000	3,000
		식품산업과	그린바이오 벤처캠퍼스 조성	1,070	700	370	300
		해양산업과	제주해양치유센터 건립사업	7,000	3,500	3,500	3,500	공공자금 관리기금
		해양산업과	해양레저관광거점사업	4,000	2,000	2,000	2,000
		해양산업과	지방어항건설(균특이양)	4,500		4,500	4,500
		보훈청	보훈회관 건립사업	3,761		3,761	3,400
		도립미술관	문화예술수장고 증축공사	6,300		6,300	6,300
		제주환경자원 순환센터	바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치사업	12,285	8,600	3,685	3,200
		상하수도본부	고도정수처리시설 사업	21,233		21,233	8,500
		상하수도본부	노후 상수관망정비사업	102,876	37,976	64,900	20,000
		상하수도본부	동지역 상수도 유수율 제고사업	41,838		41,838	1,500
		상하수도본부	하수처리장 증설사업	233,300	74,400	158,900	52,000
		상하수도본부	하수관로 정비사업	9,993	3,596	6,397	4,000
		상하수도본부	노후 차집관로 정비사업	38,231	12,291	25,940	14,000
	제주시		소 계(64건)	150,865	9,232	141,633	134,700
		총무과	연동주민센터 청사 신축	12,000		12,000	12,000	공공자금 관리기금
		안전총괄과	신창·한원 자연재해위험개선지구 정비사업	4,170	2,085	2,085	2,000
		안전총괄과	우도1 자연재해위험개선지구 정비사업	674	337	337	300
		안전총괄과	평대 자연재해위험개선지구 정비사업	4,090	2,045	2,045	2,000
		안전총괄과	교래 자연재해위험개선지구 정비사업	200	100	100	100
		안전총괄과	한천 자연재해위험지구 정비사업	4,152	2,076	2,076	2,000
		안전총괄과	수산천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,000		2,000	2,000
		안전총괄과	삼수천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,500		2,500	2,500
		안전총괄과	동신술굴내 소하천 정비사업(균특이양)	2,500		2,500	2,500
		노인복지과	(가칭)광양경로당 및 청소년시설 신축	4,770		4,770	2,900
		문화예술과	시민회관 복합화시설조성	4,573	-	4,573	4,500
		체육진흥과	이호게이트볼장 토지매입	4,223		4,223	3,500
		체육진흥과	서부지역 파크골프장 조성사업	3,000		3,000	3,000
		기후환경과	사용종료 폐기물 처리시설 철거 및 정비	4,500		4,500	2,700	지역개발지원금
		친환경농정과	농업용수 저수시설 정비사업(균특이양)	3,000		3,000	3,000
		친환경농정과	소규모 배수개선사업(균특이양)	2,500		2,500	2,500
		친환경농정과	농촌생활환경정비사업(균특이양)	3,000		3,000	2,400
		친환경농정과	농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	2,000		2,000	2,000
		친환경농정과	농업용수 관로 정비사업(균특이양)	4,000		4,000	3,000
		해양수산과	협재리 행복한삶터 조성사업	1,940	1,358	582	500
		해양수산과	제주시 화북항 어촌신활력증진사업	1,759	1,231	528	500
		해양수산과	추자 인도교 및 수변공원 경관조명 설치공사	1,000		1,000	1,000
		도시계획과	신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	4,000		4,000	4,000
		도시계획과	한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	2,400		2,400	2,400
		도시계획과	연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업	3,300		3,300	3,300
		도시계획과	노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	1,800		1,800	1,800
		도시계획과	제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	2,500		2,500	2,500
		도시계획과	대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	2,760		2,760	2,700
		도시계획과	아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	1,000		1,000	1,000
		도시계획과	이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업	200		200	200
		도시계획과	애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	1,000		1,000	1,000
		도시계획과	함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	1,000		1,000	1,000
		도시계획과	한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업	200		200	200
		도시계획과	아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	700		700	700
		도시계획과	도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	2,400		2,400	2,400
		도시계획과	제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	500		500	500
		도시계획과	귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	1,150		1,150	1,100
		도시계획과	용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	2,530		2,530	2,500
		도시계획과	하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	900		900	900
		도시계획과	한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	1,000		1,000	1,000
		도시계획과	애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	1,000		1,000	1,000
		도시계획과	연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	2,000		2,000	2,000
		도시계획과	오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	2,200		2,200	2,200
		도시계획과	화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	3,050		3,050	3,000
		도시계획과	중앙중~오남로간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	3,000		3,000	3,000
		도시계획과	산천단(5.16도로, 대로1-1-9호선) 도시계획도로 확장사업	1,500		1,500	1,500
		도시계획과	신산마을(소로1-9) 도시계획도로 개설사업	1,000		1,000	1,000
		도시계획과	애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선) 확장사업	1,000		1,000	1,000
		도시계획과	남조봉공원 토지매입	4,500		4,500	4,500
		도시계획과	서부공원 토지매입	4,000		4,000	4,000
		도시계획과	용담공원 토지매입	3,000		3,000	3,000
		도시계획과	명월공원 토지매입	4,500		4,500	4,500
		도시계획과	사라봉공원 토지매입	6,200		6,200	6,200	지역상생 발전기금
		도시계획과	대림공원 토지매입	3,000		3,000	3,000
		공원녹지과	명월공원 조성사업	200		200	200
		공원녹지과	사라봉공원 조성사업	300		300	300
		공원녹지과	대림공원 조성사업	200		200	200
		공원녹지과	화북공원 조성사업	100		100	100
		건설과	대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	2,000		2,000	2,000
		건설과	사장밭선 농어촌도로 정비사업	500		500	500
		건설과	군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	300		300	300
		건설과	송당선 농어촌도로 정비사업	500		500	500
		건설과	시도40호선(광성로~애조로) 확·포장사업	1,000		1,000	1,000
		우도면	우도면 직원관사 신축공사	3,924		3,924	3,600
	서귀포시		소 계(55건)	167,797	27,213.5	140,583.5	131,800
		마을활력과	농촌중심지활성화사업(남원읍)	3,900	2,730	2,770	2,700
		체육진흥과	서귀포시 종합체육관 건립사업	16,400	4,400	12,000	12,000	공공자금 관리기금
		체육진흥과	서귀포 반다비 체육센터 건립	1,300	800	500	500
		서귀포공립미술관	이중섭미술관 시설확충사업	20,500		20,500	15,700
		친환경농정과	농업용수 수리시설개보수(균특이양)	5,000		5,000	5,000
		친환경농정과	농업용수 통합관리사업(균특이양)	5,000		5,000	5,000
		해양수산과	신도항 어촌신활력증진사업	2,720	1,904	816	800
		해양수산과	토산항 어촌신활력증진사업	1,480	1,036	444	400
		해양수산과	오조리 행복한 삶터 조성	1,740	1,218	522	500
		생활환경과	환경복지관리지원센터 조성사업	5,000		5,000	5,000
		공원녹지과	삼매봉 도시생태축 복원사업	2,824	1,977	847	800
		안전총괄과	재해위험개선지구 정비사업	8,499	4,249.5	4,249.5	4,200
		안전총괄과	수산2 풍수해 생활권 종합정비사업	1,000	500	500	500
		안전총괄과	상하모지구 우수저류시설 설치사업	4,000	2,000	2,000	2,000
		안전총괄과	민군복합항 진입도로 선형개선사업	3,000		3,000	3,000	지역개발지원금
		도시과	성산읍 고성리 도시재생 기반시설 구축사업	9,122	5,473	3,649	3,600
		도시과	화순사거리~화순항(중로2-5-2) 도로개설사업	1,600		1,600	1,600
		도시과	남원(소로2-44호선) 도로개설사업	640		640	600
		도시과	대정 하모지구(소로2-13) 도로개설사업	300		300	300
		도시과	중문~회수간(대로1-1-3) 도로개설사업	2,500		2,500	2,500
		도시과	서홍마을안길(중로2-1-48) 도로개설사업	3,100		3,100	1,200
		도시과	삼성여고~칼호텔(중로3-1-18) 도로개설사업	500		500	500
		도시과	쇠소깍인근(소로2-6) 도로개설사업	500		500	500
		도시과	토평동(중로2-1-12) 도로개설사업	650		650	600
		도시과	성산읍 고성리(중로2-4-9) 도로개설사업	1,300		1,300	1,300
		도시과	남원 태흥리(중로3-3-6) 도로개설사업	500		500	500
		도시과	중문중학교(소로1-2호선) 도로개설사업	900		900	900
		도시과	보목동(중로2-1-13) 도로개설사업	650		650	600
		도시과	성산읍(중로2-4-8) 도로개설사업	600		600	600
		도시과	토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1) 도로개설사업	2,500		2,500	2,500
		도시과	하원초~월평마을(중로2-1-16) 도로개설사업	2,100		2,100	2,100
		도시과	대정읍 인성리(중로2-2-1) 도로개설사업	2,500		2,500	2,500
		도시과	성산읍 수산리(중로2-4-12) 도로개설사업	650		650	600
		도시과	보목(소로1-3)도로개설사업	820		820	800
		도시과	성산고입구~성산리(대로3-4-2) 도로개설사업	1,400		1,400	1,400
		도시과	효돈(소로1-9)도로개설사업	1,000		1,000	1,000
		도시과	하모리~상모리(대로3-2-1) 도로개설사업	2,852	926	1,926	1,900
		도시과	효돈(소로1-5) 도로개설사업	500		500	500
		도시과	화순마을안길(소로2-13) 도로개설사업	600		600	600
		도시과	상예동~중문동(대로1-1-1) 도로개설사업	5,500		5,500	5,500
		도시과	대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로개설사업	1,200		1,200	1,200
		도시과	호근(중로2-1-41) 도로개설사업	1,400		1,400	1,400
		도시과	대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	2,700		2,700	2,700
		도시과	서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업	2,550		2,550	2,500
		도시과	신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	700		700	700
		도시과	삼매봉공원 토지매입	10,600		10,600	10,600
		도시과	엉또공원 토지매입	2,100		2,100	2,100
		도시과	중문공원 토지매입	8,200		8,200	8,200	지역상생 발전기금
		도시과	월라봉공원 토지매입	1,000		1,000	1,000
		건설과	소규모 배수개선사업(균특이양)	5,000		5,000	5,000
		건설과	사계~서광간 시도 21호선 확포장사업	500		500	500
		건설과	서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업	500		500	500
		건설과	화순~서서로간 시도 35호선 확포장사업	500		500	500
		건설과	세화~가시간 시도45호선 확포장사업	1,000		1,000	1,000
		건설과	신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	1,100		1,100	1,100

*비고란 차입선은 중앙정부 및 기금 등에서 미확정임에 따라 임시적으로 배분(안) 작성

**비고란 공란인 사업은 금융기관에서 차입할 예정

Ⅳ	향후 채무관리계획

1. 채무현황 및 채무관리 목표

□ 지방채무 현황 (2024년 결산기준)

(단위: 백만 원)

관리채무 (A+B)	일반채무 (A)	BTL임차료 (B)	채무지표
			관리채무부담도	관리채무상환비비율
1,436,716	1,327,603	109,113	36.14%	5.02%

* 관리채무부담도 = [eqn: {관리채무} over {경상일반재원}],  관리채무상환비비율 = [eqn: {미래4년`평균``관리채무상환할액(순지방비)} over {미래4년`평균`경상일반재원`}]×100

□ 채무관리목표 ⇒ 관리채무비율 관리목표 21% 이내

❍ (’26) 20.60%→(‘27) 20.37% →(‘28) 20.06% →(‘29) 19.82% →(‘30) 19.84%

(단위: 억 원)

구 분						2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
채무	일반채무잔액(A+B)					14,972	18,518	18,888	19,189	19,536	20,155
	관리채무잔액(A+B+C)					15,936	19,343	19,569	19,721	19,932	20,411
	실질채무잔액(A+B+C+D)					25,306	28,483	27,752	26,238	25,248	25,168
지방채	지방채 누계(A)					12,641	16,340	17,002	17,506	17,937	18,556
			발행액			2,420	4,500	2,000	2,000	2,000	2,000
			정기상환액			540	801	1,338	1,496	1,569	1,381
지역 개발 채권	채권 누계(B)					2,331	2,178	1,886	1,683	1,599	1,599
			발행액			320	320	320	320	320	320
			상환액			504	473	612	523	404	320
임대형민자(BTL)(C)						964	825	681	532	396	256
예수금	예수금 누계(D)					9,370	9,140	8,183	6,517	5,316	4,757
			통합기금			5,462	5,271	4,432	2,835	1,668	1,143
					재정융자	2,050	400	200	200	200	200
					상환액	872	591	1,039	1,797	1,367	725
			지역개발기금			3,908	3,869	3,751	3,682	3,648	3,614
					재정융자	400	400	320	320	320	320
					상환액	439	439	438	389	354	354
예산대비 일반채무비율						16.31%	19.72%	19.66%	19.52%	19.43%	19.59%
예산대비 관리채무비율						17.36%	20.60%	20.37%	20.06%	19.82%	19.84%
예산대비 실질채무비율						27.57%	30.33%	28.89%	26.70%	25.11%	24.47%
최종 예산액						91,787억원	93,898억원	96,058억원	98,267억원	100,527억원	102,839억원
1인당 채무액						2,240천원	2,780천원	2,844천원	2,899천원	2,961천원	3,064천원
재정안정화기금적립액						1,451억원	1,172억원	1,172억원	1,172억원	1,172억원	1,172억원

1) 예산: 2024년 최종예산(89,724억원) 기준 매년 2.3% 증가 적용

2) 인구: 2024년 말 기준 670,368명, 최근 3년 평균 증감률 △0.32% 적용

3) 재정안정화계정은 순세계잉여금의 30%이상을 적립

3. 향후 채무관리대책

□ 지방채 발행 운영

❍‘장기미집행도시계획시설(도로, 공원)’ 토지보상 및 공사 등과 세수 여건을 고려하여 대규모 투자사업, 재해예방 및 복구사업 추진을 위한 지방채 발행

- 장기미집행도시계획시설, 기타 재정투자사업(2026~2028)

: 2026년 3,500억 원, 27~28년 1,500억 원/년 내외

- 상하수도사업공기업특별회계: 26년 1,000억 원, 27~28년 500억 원/년 내외

❍ 건설경기 활성화 등에 중점을 두어 지방채를 투입할 예정으로, 지방채무비율은 2028년까지 21% 이내로 관리 목표를 상향하여 경제 활성화 도모

□ 지방채 상환

❍ 일반회계 순세계잉여금의 30% 이상을 ‘통합재정안정화기금(재정안정화계정)’에 적립하고 지방채 원리금의 상환재원으로 활용

❍ 2027년 이후 일반회계 재원의 일정 비율을 조기상환 목적으로 활용하는 방안을 마련하여 관리채무비율 20%이내 환원 적극 추진

참고자료		지방채 및 예수금 발행·상환 추계

❍ 발행 추계                                           (단위: 억 원)

구 분				2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
총계(①+②+③+④)				5,190	5,675	2,840	2,840	2,840	2,840
일반채무(①+②)				2,740	4,820	2,320	2,320	2,320	2,320
		① 지방채		2,420	4,500	2,000	2,000	2,000	2,000
			일반회계	1,620	3,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			특별회계	800	1,000	500	500	500	500
		② 지역개발채권		320	320	320	320	320	320
③ BTL(지방비)				-	-	-	-	-	-
④ 예수금				2,450	855	520	520	520	520
	통합계정			2,050	455	200	200	200	200
	지역개발기금			400	400	320	320	320	320

❍ 상환 추계                                           (단위: 억 원)

구 분			2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
총계(①+②+③+④)			2,488	2,442	3,570	4,354	3,976	2,938
관리채무(①+②+③)			1,177	1,412	2,093	2,168	2,104	1,841
일반채무(①+②)			1,044	1,274	1,950	2,019	1,973	1,701
	① 지방채		540	801	1,338	1,496	1,569	1,381
		일반회계	540	801	1,230	1,333	1,346	1,094
		특별회계	-	-	108	163	223	287
	② 지역개발채권		504	473	612	523	404	320
③ BTL(지방비)			133	138	143	149	131	140
④ 예수금			1,311	1,030	1,477	2,186	1,872	1,097
	통합계정		872	591	1,039	1,797	1,518	743
	지역개발기금		439	439	438	389	354	354

붙 임		지방채 발행 사업 현황

1		(가칭)제주자치지원센터 신축 공사

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주 120만덕콜센터 건축물 노후(`88년 신축) 등에 따라 (구)보건환경연구원 부지를 활용하여 건물 신축 및 콜센터 이전 예정

※ (구)보건환경연구원 건물 노후(`63년 준공) 및 안전진단 결과(D등급 판정)에 따른 철거 완료(‘24.5.21.)

○ 2청사 및 경제통상진흥원에 분산 운영되고 있는 자치행정과 소관 4개 센터 등에 대한 통합 사무공간 제공을 위해 신축 및 이전 필요

2. 지방채 발행계획: 900백만원

3. 추진경위

○ 공공건축심의위원회 심의 완료: ‘23. 5. 1.

○ 구)보건환경연구원 건축물 해체 심의 완료: ‘23. 5. 3.

○ (가칭)제주자치지원센터 설계공모 완료: ‘23. 8. 16.

○ (가칭)제주자치지원센터 실시설계(576백만원): ‘23. 11. 16. ~ ‘24. 11. 30.

○ 구)제주보건환경연구원 건축물 철거 완료: ‘24. 5. 21.

○ 녹색건축, 건축물에너지효율, 제로에너지 예비인증 용역 완료: ‘24. 9. 12.

※ 예비인증완료: 건물에너지효율(‘24.7.18.), 제로에너지 (‘24.8.12.), 녹색건축(‘24.8.27.)

○ 신축공사 BF 예비인증 용역 완료 : ‘24. 9. 26.

※ 예비인증완료: 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증(‘24.9.20.)

○ 설계경제성 검토(VE) 용역 완료: ‘24. 10. 2.

○ (가칭)제주자치지원센터 신축 공사 착공 : `25. 1. 3.

4. 사업개요

○ 기  간 : ‘23 ~ ‘26년(4년)

○ 위  치 : 제주시 연동 313-40(구, 보건환경연구원 부지)

○ 내  역 : (가칭)자치지원센터 신축 공사 1식

- 연면적 3,102.44㎡(지하 1층, 지상 4층) *대지면적: 1,414.7㎡

○ 공정율 : 현재 약 19% (지하굴토공사 및 기초 버림콘크리트 타설 완료)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		16,500	11,187	5,313		900	4,413
시설비		15,030	9,960	5,043		900	4,143
감리비		620	377	270			270
부대비		850	850

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		16,500		11,187		5,313
공사비	연면적 3,102.44㎡ (지하1층, 지상1층) 철거 및 신축공사	15,030	철거공사 신축공사 (공정률61%)	9,960	철거공사 신축공사 (공정률100%)	5,043
감리비	공사감리	620	공사감리 (공정률61%)	377	공사감리 (공정률100%)	270
부대비	실시설계, 인증수수료, 기타 용역 등	850	실시설계, 인증수수료, 기타 용역 등	850

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	16,500	11,187	5,313
지 방 채	12,915	8,500	900
시 도 비		2,687	4,413

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 건물 노후 및 협소한 상담공간으로 밀집되어 운영되고 있는 제주120만덕콜센터 직원들의 근무여건 개선

○ 분산 운영되고 있는 각 소관단체 센터에 대해 통합 사무공간 제공으로 운영의 효율성 제고

2		제주 스마트공동물류센터 조성

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주는 지리적 제약으로 인해 국가물류기간망에서 제외되어 있을 뿐만 아니라 육상-해상-육상으로 이어지는 물류체계로 인해 불이익 지속

○ 제주 중소 제조업 등의 물동량을 한 곳에 집적시켜 물류비 과다 부담을 해소할 수 있도록 디지털 기술에 기반한 공동물류센터 조성

2. 지방채 발행계획: 3,500백만원

3. 추진경위

○ 2021. 07. : 제주 물류시스템 구축에 대한 국가의 지원 근거 마련

* 제5차 국가물류 기본계획(2021～2030), “제주 반‧출입 화물이 국가물류 기간망과 연계 수송이 가능하도록 효율적인 물류시스템 구축 지원 추진” 명시

○ 2021. 12. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료

○ 2022. 03. : ‘22년 국가물류시행계획에 “제주 스마트공동물류센터 조성사업” 반영

○ 2022. 12. : 공유재산관리계획안 의결

○ 2023. 06. : 토지 및 물건(수목) 보상 완료

○ 2023. 10. : 조달청 공사원가 사전검토 완료

○ 2024. 11. : 실시설계용역 완료(건축‧전기‧통신․소방)

○ 2024. 12. : 시설공사 착공(건축‧전기‧통신․소방)

4. 사업개요

○ 기  간: 2023 ～ 2026년(4개년)

○ 위  치: 제주시 아라이동 266번지 일원

○ 규  모: 지하 1층 / 지상 2층, 연면적 5,600㎡

○ 내  역: 저온창고, 상온창고, 관리사무소, 기사휴게실 등

○ 공정률: 40%(준공예정 ’26. 4.)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		25,800	18,680	7,120	3,560	3,500	60	-	-	-
시설비	물류센터 신축 1식	24,290	17,170	7,120	3,560	3,500	60	-	-	-
감리비	감리비 1식	1,460	1,460	-	-	-	-	-	-	-
부대비	시설부대비 1식	50	50	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		25,800		18,680		7,120	-	-
시설비	물류센터 신축 1식	24,290	토지매입 등 시설비	17,170	공사비 등 시설비	7,120	-	-
감리비	감리비 1식	1,460	감리비	1,460	-	-	-	-
부대비	시설부대비 1식	50	시설부대	50	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	25,800	18,680	7,120	-
국 비	9,200	5,640	3,560	-
지 방 채	5,500	2,000	3,500	-
시 도 비	11,100	11,040	60	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도내 중소 제조기업의 소량․다빈도 물동량의 집적화, 물류체계 개선 등을 통한 물류비 부담 완화로 경쟁력 강화

○ 물류약자인 도내 영세 제조업체와 도민에 대한 물류 기본권 보장

3		서귀포시 수소충전소 구축사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 「그린수소 글로벌 허브 구축계획」(ʼ22.9월), 「에너지전환 로드맵」(ʼ23.1월), 「에너지대전환 시나리오」(ʼ24.5월)에 따른 그린수소 경제 활성화 추진

○ ʼ23.8월에 준공된 함덕 그린수소 충전소는 행원 3.3MW 수소생산기지와 연계하여 도내 그린수소 생산·충전·활용 생태계를 성공적으로 조성

※ 현재(ʼ25.8월 기준) 수소모빌리티 85대(버스 22대, 청소차 1대, 승용 62대)가 운행 중

○ 도내 수소충전소가 제주시에만 구축(함덕, 도두)됨에 따라 서귀포시 수소충전소 구축으로 지역균형발전과 지역 주민 충전편의를 제공하고 수소모빌리티 확산 추진

2. 지방채 발행계획: 1,900백만원

3. 추진경위

○ 2025. 9. 23. 공유재산관리계획 심의 완료

○ 2025. 9. 29. 지방재정투자심사 심의 완료

○ 2025. 10. 2. 공기관대행 심의 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. ~ 12.

○ 위  치: 서귀포시 일원

○ 내  역: 특수 수소충전소 1개소(디스펜서 2기) 구축

- 주요시설: 설비동(압축설비, 튜브트레일러, 저장용기 등), 충전동(디스펜서, 캐노피 등), 사무동(사무실, 휴게공간)

○ 공정률: 0%(공사착공 - ʼ26. 1.)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		7,500	-	7,500	4,200	1,900	1,400	-	-	-
설계비	1식	93	-	93	52	24	17	-	-	-
기자재비	1식	4,808	-	4,808	2,692	1,217	899	-	-	-
공사비	1식	1,914	-	1,914	1,072	485	357	-	-	-
부대비	1식	685	-	685	384	174	127	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		7,500				7,500
설계비	설계 및 인허가 1식	93	-	-	설계 및 인허가 1식	93	-	-
기자재비	자재 구입 1식	4,808	-	-	자재 구입 1식	4,808	-	-
공사비	공사 1식	1,914	-	-	공사 1식	1,914	-	-
부대비	폐기물처리비, 감리비 등	685	-	-	폐기물처리비, 감리비 등	685	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,500	0	7,500	0
국 비	4,200	-	4,200	-
지 방 채	1,900	-	1,900	-
시 도 비	1,400	-	1,400	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 수소충전소 구축에 따른 서귀포시 지역주민 수소차 이용 편의 제공

○ 관련 산업(수소 생산, 운송, 유지관리 등) 육성을 통한 지역경제 활성화

4		사용후 배터리 자원화 통합센터 구축

1. 사업목적 또는 필요성

○ 사용후 배터리의 자원화 및 재활용을 통한 순환경제 기반 구축

○ 국가 탄소중립 및 에너지 전환 목표 실현을 위한 인프라 기반 마련

2. 지방채 발행계획: 1,000백만원

3. 추진경위

○ 사용후 배터리 자원화 통합센터 개념 수립: 2025. 1.

※ 제주도-환경부 협의를 통한 사업 개념 수립

○ 사업 추진을 위한 부처 협의 및 사업계획 제출: 2025. 3. / 2025. 4.

○ 사용후 배터리 자원화 통합센터 구축사업 추진 건의: 2025. 5.

※ 2026년도 신규 예산 반영을 위한 사업 추진 건의(환경부⇒기획재정부)

○ 기획재정부 예산 심의 완료 및 2026년 정부안 국회 제출: 2025. 9. 3

※ 2026년도 환경부 소관 국고보조사업 예산안 가내시 반영: 2025. 9. 19.

○ 2025년 제6회 공유재산심의회 심의(원안가결): 2025. 9. 24.

○ 지방재정투자심사, 공기관 대행 심의(원안가결): 2025. 9. 30.

4. 사업개요

○ 위    치: 제주시 구좌읍 동복리 산56-12번지

○ 사업기간: 2026년 1월 ~ 2029년 12월

○ 총사업비: 13,000백만원(국비 6,500백만원, 도비 6,500백만원)

※ 사용후 배터리 적재/보관 시스템, 배터리 자동 해체 시스템, 재사용/재활용 정밀 판별 및 고속 진단시스템 구축

○ 사 업 량: 건물 신축 1동(지상 1층, 연면적 2,000㎡)

○ 주요내용: 배터리 보관공간, 사무공간

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계
공사비	설계 1식			13,000	1,000	1,000				11,000
감리비
부대비

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계						2,000
공사비					설계 1식	2,000
감리비
부대비

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	13,000		2,000	11,000
국 비	6,500		1,000	5,500
지 방 채	6,500		1,000	5,500
시 도 비	0

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 고부가가치 자원인 사용후 배터리에 대한 국가-지자체 차원의 통합관리체계 시범모델 창출로 전국 단위 미래폐자원 관리 표준모델 정립

○ 중앙정부 주도 자원순환정책의 실행력 강화에 따른 “배터리 수거-진단-재사용-재활용”전(全)주기 구조를 지자체 단위에서 구체적 성과로 환류 가능

5		가칭제주특별자치도 노인복지지원센터 건립 사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 초고령화 사회 진입에 따른 노인복지 서비스 향상과 통합 복지서비스 지원을 위한 노인복지복합건물 건립 필요

※ 사업시행 근거 : 노인복지법 제37조(노인여가복지시설의 설치)

2. 지방채 발행계획: 11,300백만원

3. 추진경위

○ 2024년 제7회 공유재산심의회 심의: ’24. 10. 17.

○ 가칭제주특별자치도 노인복지지원센터 건립 변경계획 수립: ’24. 10. 21.

○ 2024년 수시 제16차 지방재정계획 심의: ’24. 10. 21.

○ 공유재산관리계획안 도의회 의결: ’24. 11. 20.

○ 부동산 매매계약 체결 및 소유권 이전 가등기: ’25. 4. 17.

○ 건축 기획설계 추진: ’25. 5. 29. ~ 9. 25.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 신청: ’25. 10. 14.

4. 사업개요

○ 기    간: 2024년 ~ 2027년

○ 총사업비: 26,354백만원

○ 위    치: 제주시 오라삼동 2416

○ 내    역: 노인복지지원센터 건립 1동(2,754㎡, 지하1층~지상4층)

○ 공 정 율: 0%(공사착공 – ’26. 3.)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	노인복지 지원센터 건립 1동	26,350	9,900	16,450	-	11,300	356	-	-	4,794
공사비		5,364	-	5,364	-	1,267	356	-	-	3,741
시설부대경비		2,210	480	1,730	-	677	-	-	-	1,053
보상비		18,776	9,420	9,356	-	9,356	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	노인복지 지원센터 건립 1동	26,350		9,900		11,656		4,794
공사비		5,364	-	-	리모델링(지하1층~지상4층) 엘리베이터 신축 등	1,623	리모델링(지하1층~지상4층) 엘리베이터 신축 등	3,741
시설부대경비		2,210	지형측량, 감정평가, 기획설계 등	480	실시설계비, 감리비 및 예비비 등	677	인증관련(용역, 수수료), 안전성검토, 예비비 등	1,053
보상비		18,776	토지 및 건물매입비(1차) 및 수수료 등	9,420	토지 및 건물 매입비(2차)등	9,356	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	26,350	9,900	11,656
국 비	-	-	-	-
지 방 채	1,650	-	11,300	-
시 도 비	-	9,900	356	4,794

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노인복지 통합서비스 제공을 통한 건강한 노후 생활 및 삶의 질 향상

6		곶자왈 도민 자산화 사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주핵심자연자산인 곶자왈의 체계적 보전 관리를 위한 보조지역 조사 지역에 대한 사유 토지를 매입하여 도민자산 공공자원으로 기여

○ 곶자왈지역 토지 소유자들에게 대한 사유재산권 제한에 따른 민원 해소

2. 지방채 발행계획: 1,300백만원

3. 추진경위

○ ‘25년도 곶자왈 사유지매입 공고 실시: '24. 08. 12(접수기간: 8.12~31일)

※ 22필지 548,431㎡(지분 요청 등 매입제외 3개 필지 196,671㎡) 접수

○ 매입대상지(19필지,351,760㎡) 공유재산 행정절차 이행: ‘24. 10. ~ 11.

○ 매입 우선순위 선정 완료('25년 제1회 곶자왈보전위원회): ‘25. 2

○ (1차) 매입 대상지 감정평가 의뢰 및 매입 추진: ‘25. 3. ~ 6.

- 매입 완료: 7필지, 60,175㎡

○ (2차) 매입대상지 감정평가 의뢰 및 매입 추진: ‘26. 1. ~ 3.

- 12필지･291,585㎡

○ ‘27년도 곶자왈 사유지매입 공고 실시

4. 사업개요

○ 기  간: 2023 ~ 2027

○ 위  치: 제주도 곶자왈지역(7개 지역)

○ 내  역: 사유지 매입 270,656㎡

○ 공정률: 25%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	1,062,241㎡	23,300	5,000			1,300				17,000
매입비	1,062,241㎡	23,300	5,000			1,300				17,000
감리비
부대비

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1,062,241㎡	23,000	270,656㎡	5,000	291,585㎡	1,300	500,000㎡	17,000
매입비	1,062,241㎡	23,000	270,656㎡	5,000	291,585㎡	1,300	500,000㎡	17,000
감리비
부대비

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	23,300	5,000	1,300	17,000
국 비
지 방 채	1,300		1,300
시 도 비	22,000	5,000		17,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 곶자왈 보호지역 지정으로 해당 토지소유자의 사유재산권 침해 방지

○ 제주의 핵심자산인 곶자왈을 개발 압력에서 보호 및 기후변화대응 탄소흡수원 등 생태계서비스 제공

7		하논분화구 핵심구역 사유지 매입

1. 사업목적 또는 필요성

○ 하논분화구는 한반도 유일의 마르(marr)형 분화구로 과거 5만 년 동안 기후･지질･식생 등 다양한 환경 정보가 담겨 있는 생태계의 타임캡슐로 그 가치가 평가 되고 있음.

○ 2012 WCC(세계자연보전총회)에서 하논분화구 복원･보전 권고 이후 2013년 복원 기본계획 수립, 제19대 대통령 지역공약사업 반영, 습지보호지역 지정 등에 대한 찬반 등 보존과 개발에 대한 다양한 의견이 제시되면서, 2025. 3월『하논분화구 보전 및 현명한 이용을 위한 기본계획』 용역이 추진됨.

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 2012 WCC(세계자연보전총회): 하논분화구 복원․보전 권고

○ 하논분화구 복원 기본계획 수립(서귀포시): ’13.4. ~ ’14.6.

○ 하논분화구 복원․보전 수정계획안 마련(서귀포시): ’17.7.

○ 제19대 대통령 지역공약사업 반영(장기검토 분류): '18.2.

* 토지주 동의 및 사업비 확보 문제 등

○ 하논분화구 습지 생태계 조사(도): ’19.2. ~ ’20.6.

○ 하논지구발전협의회 면담: ’22.12.

* 습지보호지역 지정 반대 및 개발계획 수립 요청 의견 개진

○ 하논지구발전협의회 면담: ’23.4.27.

○ (도지사) 하논분화구 현장 방문: ’23.5.16.

- 하논분화구 보전 및 활용 방안 마련 지시

○ 하논분화구 보전 및 활용 기본(관리)방향 보고: ’23.6.27.

- (당초) 복원 및 보전 → (변경) 보전 및 현명한 이용

○ 하논분화구 보전 및 현명한 이용을 위한 기본계획 용역 완료: ‘24.4.~ ’25.3.

○ 하논분화구 보전 및 현명한 이용을 위한 기본계획 및 실행계획 수립: ’25.7.

○ 핵심구역 사유지 매입 공고 시행: ’25.7.10.

- 매도승낙서 접수결과 100필지 56,398㎡

4. 사업개요

○ 기  간: 2026 ~ 2033

○ 위  치: 서귀포시 하논분화구 일원 (서홍동･호근동)

○ 내  역: 하논분화구 핵심구역 (사유지 527 필지･218,444㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	218,444㎡	19,800				2,000				17,800
매입비	218,444㎡	19,800				2,000				17,800
감리비
부대비

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	218,444㎡	19,800		-	15,000㎡	2,000	203,444㎡	17,800
매입비	218,444㎡	19,800		-	15,000㎡	2,000	203,444㎡	17,800
감리비
부대비

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	19,800		2,000	17,800
국 비
지 방 채	2,000		2,000
시 도 비	17,800			17,800

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 하논분화구의 가치, 경관, 생태계 등 체계적인 보전과 지속가능한 이용 가능

○ 핵심구역(습지 및 수로길)에 대한 복원을 통해 하논의 가치 증진

8		신규 광역 폐기물소각시설 설치사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 2030년 생활폐기물 직매립 금지 정책 시행에 대비하고, 도내에서 처리하기 어려운 하수슬러지, 음식물슬러지를 발생지 처리 원칙에 따라 적정 처리하기 위한 신규 광역 폐기물소각시설 건립 추진

○ 2004. 1월부터 운영 중인 남부광역환경관리센터(소각시설 70톤/일, 서귀포시 색달동) 노후에 따른 신규 대체시설 건립 필요

2. 지방채 발행계획: 4,700백만원

3. 추진경위

○ (2023. 12. 15.) 신규 광역 폐기물소각시설 기본계획 수립

○ (2023. 12. 15.) 신규 광역 폐기물소각시설 전략환경영향평가 완료

○ (2024.  2.  7.) 폐기물처리시설 입지결정 고시

○ (2024.  5.  3.) 예비타당성 조사 면제 선정

○ (2024.  3. 29.) 문화재 표본조사 용역 착수

○ (2025.  2.  4.) 사업적정성 검토결과 통보(한국조세재정연구원 )

○ (2025.  4. 29.) 건설기술위원회 심의의결(입찰방식-일괄입찰 결정)

○ (2025.  6. 20.) 폐기물처리시설 설치사업 위수탁 협약체결(한국환경공단)

○ (2025.  6. ~  ) 환경영향평가용역 착수

○ (2025.  9. 23.) 공유재산관리계획 심의(결과: 가결)

4. 사업개요

○ 기  간: 2026년 ~ 2029년

○ 위  치: 서귀포시 안덕면 상천리 산12번지

○ 내  역: 폐기물소각시설 330톤/일

○ 공정률: 2026년 기본설계 예정

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	소각시설 330톤/일	229,561		9,556	4,778	4,700	78	-	-	220,005
공사비	소각시설 330톤/일	229,561		9,556	4,778	4,700	78	-	-	220,005

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	소각시설 330톤/일	229,561	-	-	기본설계 등	9,556	시설공사 추진	220,005
공사비	소각시설 330톤/일	229,561	-	-	기본설계 등	9,556	시설공사 추진	220,005

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	229,561	-	9,556	220,005
국 비	114,780	-	4,778	110,002
지 방 채	114,703	-	4,700	110,003
시 도 비	78	-	78	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 하수슬러지, 음식물슬러지 등 도내 처리기반 마련

○ 신규 광역 폐기물소각시설 건립으로 자원순환 혁신도시 조기 조성

9		제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설공사

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 일주도로 서귀포여중~삼성여고 간 우회도로 건설로 도심 교통난 및 교통환경 개선

2. 지방채 발행계획: 5,000백만원

3. 추진경위

○ 2018. 5. 제1차 구국도 도로건설 관리계획 반영

○ 2021. 12. 예비타당성조사 통과(AHC 0.62,  B/C 1.09)

○ 2023. 5. 기본 및 실시설계용역 착수(용역추진 중)

4. 사업개요

○ 기  간: 2023 ~ 2030

○ 위  치: 서귀포시 서홍동, 토평동 일원

○ 내  역: 연장 2.8km(4차로)

○ 공정률: 기본 및 실시설계 용역 추진 중

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		53,031	4,300	5,500	500	5,000	0	0	0	43,231
공사비	도로건설 2.8km	21,945	2,200	500	500	-	-	-	-	19,245
보상비	65,746㎡	23,553	500	5,000		5,000	-	-	-	18,053
시설부대경비	설계비, 감리비 등	2,712	1,600		-	-	-	-	-	1,112
예비비	1식	4,821	-	-	-	-	-	-	-	4,821

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		53,031		4,300		5,500		43,231
공사비	도로건설 2.8km	21,945	-	2,200	기타 공사 등	500	도로건설 2.8km	19,245
보상비	65,746㎡	23,553	-	500	14,000㎡	5,000	51,746㎡	18,053
시설부대경비	설계비, 감리비, 시설부대비 등	2,712	설계 1식	1,600	-	-	감리비 등	1,112
예비비	1식	4,821	-	-	-	-	1식	4,821

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	53,031	4,300	5,500	43,231
국 비	27,123	3,800	500	22,823
지 방 채	5,000	-	5,000	-
시 도 비	20,908	500	-	20,408

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주국제자유도시 조성을 위한 기반시설 확충 및 서귀포 도심지 교통 환경 개선

○ 서귀포시 도심지 동서지역 도히연결우회도로 개설에 따른 교통량 분산으로 도민과 관광객 도로이용 편의 제공

10		원도심 지역 빈집정비 사업(노후주택 매입 등)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주특별자치도의 빈집을 효율적으로 정비·활용하기 위해 “2024년 제주특별자치도 빈집실태조사” 등을 실시하여 최종 1,160건의 빈집을 확정

○ 빈집이 증가하고 있거나 빈집 비율이 높은 지역, 노후·불량건축물이 증가하고 있거나 정비기반시설이 부족하여 주거환경이 열악한 지역에 대하여 빈집밀집구역(도시지역) 또는 빈집우선정비구역(농어촌지역)으로 지정

○ 2025년 제주특별자치도 빈집정비계획에 따라 빈집정비구역 내 빈집 등을 매입하여 리모델링 후 공공이용시설 및 공공임대주택 등으로 활용하여 원도심 지역의 상주인구 유입을 통한 원도심 활성화, 지역균형발전 및 주거복지 서비스 향상 도모

2. 지방채 발행계획: 2,100백만원

3. 추진경위

○ ‘24. 1. ~ 12. : 제주특별자치도 빈집실태 조사

○ ’25. 2. ~ 11. : 제주특별자치도 빈집정비계획 수립

○ ’25. 4. : 불용 부동산 빈집정비계획 포함 요청(한국전력공사)

○ ’25. 9. : 지방재정계획심의(적정)

4. 사업개요

○ 기  간: 2026년

○ 위  치: 제주시 건입동 945-1번지

○ 내  역: 부지면적(1,474㎡), 연면적(1,330.7㎡), 규모(지하1/지상4),

용도(공동주택 19세대)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
매입비	1식	2,500	-	2,500	-	2,100	400	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
매입비	1식	2,500	-	-	1식	2,500	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	2,500	-	2,500	-
지 방 채	2,100	-	2,100	-
도 비	400	-	400	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 공공임대주택의 지속 공급으로 무주택 서민의 주거안정 강화, 지역균형 발전        및 주거복지 서비스 향상 기대

○ 도시지역 빈집 이용 및 공공임대주택 신축 대비 짧은 공사기간의 장점을 활용하여

원도심 지역으로의 인구유입을 촉진하고, 이를 통해 지역경제 활성화 도모

11		공공주택 건립 부지 매입

1. 사업목적 또는 필요성

○ 공공주택 건립에 필요한 부지 매입을 통한 공공주택 공급 기반 마련으로 안정적인 공공주택 공급

○ 청년, 고령자 등 다양한 계층에 맞는 공공주택 공급으로 무주택 서민의 주거 안정 및 주거복지 향상

2. 지방채 발행계획: 9,900백만원

3. 추진경위

○ 2025. 6. : 공공주택 건립 부지 매입 선정위원회

○ 2025. 9. : 공유재산 심의(제주시 이도일동)

○ 2025. 9. : 투자심사(제주시 이도일동‧구좌읍, 서귀포시 강정동‧호근동‧남원읍)

○ 2025. 10. : 공유재산 심의(제주시 구좌읍, 서귀포시 강정동‧호근동‧남원읍)

○ 2025. 10. : 공유재산관리계획 도의회 심사(제주시 이도일동)

4. 사업개요

○ 기  간 : 2026. 1 ~ 2026. 12.

○ 위  치 : 제주특별자치도 일원

- 제주시 이도일동, 구좌읍 세화리 / 서귀포시 강정동, 호근동, 남원읍 위미리

○ 내  역 : 공공주택 건립 부지 매입 1식

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
토지 매입비	1식	9,980	-	9,980	-	9,900	80	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
토지 매입비	1식	9,980	-	-	1식	9,980	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,980	-	9,980	-
지 방 채	9,900	-	9,900	-
도 비	80	-	80	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 구도심 및 읍면 지역에 공공주택 건설‧공급을 통한 청년, 신혼부부 등 무주택 서민의 주거 안정 및 인구 유입으로 지역 활성화 도모

12		15분도시 시범지구 생활필수기능시설 조성

1. 사업목적 또는 필요성

○ 민선 8기 핵심공약인 「15분 도시 제주 조성」을 위해 시범지구 생활권의 열악한 생활필수기능을 신규로 공급하기 위함.

○ 고령인구 증가에 따른 복지시설 확보와 생활권 내 사회적 교류 및 문화활동 공간 조성을 통해 지역 내 여가·돌봄 등 생활필수기능 확보

2. 지방채 발행계획: 10,800백만원

3. 추진경위

○ (2022. 12.) 민선8기 공약실천계획 수립(15분도시 제주 조성)

○ (2023. 08.) 15분도시 시범지구 4개소 선정

○ (2024. 05.) 15분도시 시범지구 기본계획 수립

○ (2024. ~ ) 15분도시 시범지구 생활필수기능시설 조성 사업 추진

4. 사업개요

○ 기  간: ‘24년 ~ 26년

○ 위  치: 4개 시범지구(제주시 삼도1·삼도2·이도1·일도1동, 제주시 애월읍, 서귀포시 천지·정방·중앙·송산동, 서귀포시 표선면)

○ 내  용

- (표선 생활문화복합센터 조성사업)

ㅇ 규  모: 노유자시설·문화및집회시설 건축(A=364㎡)

ㅇ 사업비: 5,050백만원

- (서귀포 공공오피스 조성사업)

ㅇ 규  모: 업무복합기능·기업유치공간 조성(A=156㎡)

ㅇ 사업비: 4,150백만원

- (대섭공원 조성사업)

ㅇ 규  모: 야외소공원·산책로등 조성(A=1,024㎡)

ㅇ 사업비: 500백만원

- (애월읍 생활체육거점공원 조성사업)

ㅇ 규  모: 공원 내 체육·조경시설 조성(A=5,299㎡)

ㅇ 사업비: 1,000백만원

- (생활문화복합센터 등 시공감리)

ㅇ 감리비: 100백만원

○ 공정률: 실시설계 및 행정절차 이행 중

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	생활필수기능 조성 (A=7,729㎡)	16,121	821	10,800	-	10,800	-	-		4,500
공사비	생활필수기능 조성 (A=7,729㎡)	15,960	810	10,700	-	10,700	-	-		4,450
감리비	건축 감리 1식	161	11	100	-	100	-	-		50

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	생활필수기능 조성 (A=7,729㎡)	16,121	생활필수기능 조성 (A=353㎡)	821	생활필수기능 조성 (A=6,843㎡)	10,800	생활필수기능 조성 (A=533㎡)	4,500
공사비	생활필수기능 조성 (A=7,729㎡)	15,960	생활필수기능 조성 (A=353㎡)	810	생활필수기능 조성 (A=6,843㎡)	10,700	생활필수기능 조성 (A=533㎡)	4,450
감리비	건축 감리 1식	161	건축 감리 1식	11	건축 감리 1식	100	건축 감리 1식	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	16,121	821	10,800	4,500
지 방 채	10,800	-	10,800	-
시 도 비	5,321	821	-	4,500

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도민 생활과 밀접한 생활서비스 이용 만족도를 높이고 삶의 질 제고

○ 생활필수기능의 균형적인 공급과 이용개선을 통해 균형발전 도모

13		지역거점형 콘텐츠기업지원센터 조성

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도내 지역인재 역외 유출을 방지하고 지역내 일자리 창출로 이어질 수 있도록 지역특화 콘텐츠산업 생태계 기반 마련

○ 인큐베이팅 단계에서 정체된 제주도 문화콘텐츠 산업이 엑셀러레이팅 단계에 올라서도록 지원･인재교육･기업간 연계 거점 확보

2. 지방채 발행계획: 2,900백만원

3. 추진경위

○ 2024. 04. 지역 거점형 콘텐츠기업지원센터 조성 국비 신청(문체부)

○ 2024. 09. 지역주민(평대리) 주민설명회 개최

○ 2024. 09. 2024년 정기 제3차 지방재정투자사업 심의 완료

○ 2024. 10. 2024년 제7회 공유재산심의회 심의 완료

○ 2025. 04. 구.비자림청소년수련원 용도폐지 승인(여성가족부)

○ 2025. 05. 콘텐츠기업지원센터 조성 기획업무 설계용역 착수 및 완료(7월)

○ 2025. 07. ~ 09. 공공건축 사업계획 검토 및 공공건축심의 완료

○ 2025. 09. 콘텐츠기업지원센터 조성 건축설계공모 신청(건축경관과)

4. 사업개요

○ 기  간: 2025. 1. ~ 2026. 12.

○ 위  치: 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 3161-1번지외 1필지

○ 내  역: 건물 3개동 리모델링(지하1, 지상2층), 연면적합계 3,076.02㎡

구 분	시 설 명	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	사용승인일
구.비자림 청소년 수련원	본관(숙박동)	825.56	1,764.6	1992.11.4.
	별동(숙박동)	373.12	580.5	2002.10.8.
	강당	451.36	730.92	2016.6.12.
	총 계	1,650.04	3,076.02

○ 공정률: 0%(‘26년 4월 공사발주 예정)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		9,820	500	9,320	4,660	2,900	1,760
공사비	건물3개동 공공업무시설 리모델링	9,500	500	9,000	4,500	2,800	1,700
감리비	1식	270	-	270	135	85	50
부대비	1식	50	-	50	25	15	10

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		9,800		500		9,320		-
공사비	건물3개동 리모델링	9,500	기본 및 실시설계비	500	공사비	9,000
감리비		250			감리비	270
부대비		50			부대비	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,820	500	9,320
국 비	4,910	250	4,660
지 방 채	2,900		2,900
시 도 비	2,010	250	1,760

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도내･외 콘텐츠기업 제주 유치로 콘텐츠 관련분야 양질의 일자리 창출

○ 특화된 콘텐츠 산업 육성기반 마련 및 콘텐츠산업 선순환 생태계 구조 마련

14		농업용수 노후관로 정비사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 30년 이상 노후된 농업용 관로를 정비하여 농업용수 유수율 제고로 지하수 보전

2. 지방채 발행계획: 3,000백만원

3. 추진경위

○ 2022년 제11차 제주특별자치도 지방재정계획심의(결과: 적정)

○ 2023년 농업용수 노후관로 정비사업 추진(L=9.34km)

○ 제주특별자치도 농업용수 종합계획 수립(2024. 12월)

○ 2024년 농업용수 노후관로 정비사업 추진(L=5.90km)

○ 2025년 농업용수 노후관로 정비사업 추진 중(L=5.50km)

4. 사업개요

○ 기  간: 2023. 1. ~ 2029. 12월

○ 위  치: 제주특별자치도 일원

○ 내  역: 노후관로 정비 L=327km

○ 공정률: 20%(2025년 사업)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	노후관로 정비 L=327km	26,500	8,370			3,000				15,130
공사비	노후관로 정비 L=327km	26,500	8,370			3,000				15,130

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	노후관로 정비 L=327km	26,500	노후관로 정비 L=20.74km	8,370	노후관로 정비 L=8.0km	3,000	노후관로 정비 L=298km	15,130
공사비	노후관로 정비 L=327km	26,500	노후관로 정비 L=20.74km	8,370	노후관로 정비 L=8.0km	3,000	노후관로 정비 L=298km	15,130

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	26,500	8,370	3,000	15,130
국 비	-	-	-	-
지 방 채	3,000	-	3,000	-
시 도 비	23,500	8,370		15,130

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후관로 정비에 따른 유수율 제고로 지하수 보전 및 농민들에게 안정적인 농업용수 공급

15		제주 그린바이오 벤처캠퍼스 구축

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주는 1차 산업 비중이 10.2%로 전국 평균(1.6%)의 6배 이상에 달하며, 유네스코 3관왕 지역(세계자연유산, 생물권보전지역, 세계지질공원)이자, 약 9천 여종의 천연 생물자원을 보유한 천혜의 자연을 품은 섬으로, 지리적 특성상 외부 환경 통제에 유리해 청정 생물자원을 활용한 그린바이오 산업화의 최적지임

○ 그러나, 제조업 비중은 전국 평균(27.6%)의 12%에 불과한 3.4%로 산업간 불균형이 심각하며, 신성장동력 확보와 청년·전문인력 유출 방지를 위해 그린바이오 분야 창업 및 스타트업·벤처기업 전주기 지원이 가능한 집적화된 거점 마련이 시급함

○ 현재 벤처캠퍼스 5개소(익산, 포항 등) 등 그린바이오 분야 거점시설이 내륙에 편중된 점을 감안할 때, 도서형 특화 거점 구축과 천연물 중심 창업 활성화 기반 마련 절실

2. 지방채 발행계획: 300백만원

3. 추진경위

○ 제주 그린바이오산업 혁신성장 계획 수립: '25. 2. 24.

○ 제주 그린바이오 벤처캠퍼스 조성방안 마련 및 대정부 절충: '25. 7.

○ 그린바이오 벤처캠퍼스 사업 기재부 '26년 예산안(지특회계) 반영: '25. 8.

* 새정부에서 지자체 자율성 강화 일환으로 해당사업을 지특회계 자율계정 이관 결정 통보함에 따라 ’26년부터 지특회계로 조성 추진

4. 사업개요

○ 기  간: 2026 ~ 2029(4개년)

○ 위  치: 제주특별자치도 국가첨단기술과학단지 내(제주시 아라동 일원)

○ 내  역: 그린바이오 기업 육성을 위한 벤처 캠퍼스 조성사업

* 규모: 건물(연면적 약 4,500㎡) 및 장비구입 등 1식

○ 공정률: `26년 신규사업

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	4,500㎡	24,720	-	1,070	700	300	-	-	-	23,650
공사비	4,500㎡	16,600	-	256	100	156	-	-	-	16,344
감리비	1식	1,560	-	50	-	50	-	-	-	1,510
부대비	1식	730	-	694	600	94	-	-	-	36
장비비 외	1식	5,830		70	-	-	70	-	-	5,760

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	4,500㎡	24,720	-	-	1식	1,070	1식	23,650
공사비	4,500㎡	16,600	-	-	토목공사	256	4,500㎡	16,344
감리비	1식	1,560	-	-	1식	50	1식	1,510
부대비	1식	730	-	-	1식	694	1식	36
장비비 외	1식	5,830			운영비	70	장비구축, 운영비	5,760

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	24,720	-	1,070	23,650
국 비	16,170	-	700	15,470
지 방 채	300	-	300	-
시 도 비	8,150	-	70	8,180

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 청정 천연자원을 기반으로 한 그린바이오 산업의 고도화를 통해 제조업ˑ 첨단산업의 비중 확대 및 1차 산업과의 융합을 통한 고부가가치 산업생태계 구축

○ 창업ˑ스타트업ˑ벤처기업의 연구부터 사업화까지 전 주기 지원 인프라 제공을  통한 기업 성장률 제고 및 양질의 일자리 창출

○ 인근 대학·연구기관과의 연계를 통한 기술 협력 및 R&D 생태계 강화로 지역 기업의 기술 경쟁력 제고와 제주 그린바이오 산업의 지속가능한 신성장 동력 확보

16		제주해양치유센터 건립사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주 특화 해양자원(용암해수 등)을 활용한 해양치유산업을 미래의 주력 (新)신산업으로 육성하여 지역일자리 창출 등 경제활성화 기여

2. 지방채 발행계획: 3,500백만원

3. 추진경위

○ 공유재산 관리(취득)계획 심의결과 가결 및 도의회 동의: `23.11월

○ 지방재정투자 중앙심사 결과 조건부 통과(행안부): `24.7.16.

○ 공공건축심의 전문위원회 심의 조건부 의결: `25. 7. 7.

○ 공공건축 설계공모 추진: `25. 8. 11. ~ 11. 12.

4. 사업개요

○ 기  간: 2024. ~ 2028.

○ 위  치: 성산읍 시흥리 12번지 등 5필지, 시흥체육공원 부지

○ 내  역: 치유시설, 수중보행․운동 해수풀, 치유실, 요가·명상 공간 등

○ 공정률: 0%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	1개소	48,000	4,000	7,000	3,500	3,500				37,000
공사비	제주 해양치유센터건립		4,000	5,800	2,900	2,900				33,140
감리비				1,000	500	500				2,450
부대비				200	100	100				1,410

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1개소	48,000		4,000		7,000		37,000
공사비	해양치유 센터 건립	42,940	실시설계 및 공사	4,000	건축공사	5,800	건축공사	33,140
감리비		3,450				1,000		2,450
부대비		1,610				200		1,410

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	48,000	4,000	7,000	37,000
국 비	24,000	2,000	3,500	18,500
지 방 채	3,500		3,500
시 도 비	20,500	2,000		18,500

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주의 독특하고 풍부한 해양자원을 최대한 활용한 해양치유 관련 프로그램 운영 및 지역민 주체의 센터관리를 통한 관광객과 지역민들의 복지 증진

17		해양레저관광거점사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 해수부 해양레저관광거점 공모사업 선정에 따라 서귀포항 일원에 해양레저관광 활성화를 위한 인프라를 구축하여 해양레저 허브 육성

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 해중경관지구 지정 및 해양레저관광거점사업 대상지 선정(해수부): ‘18. 11.

○ 해상공사(파제제 및 호안확장) 기본 및 실시설계용역: ‘19. 12. ~ ’20. 12.

○ 해상공사(파제제 및 호안확장) 완료: ‘21. 4. ~ ‘25. 1.

○ 육상공사(해양레저체험센터) 기본 및 실시설계용역: ‘21. 3. ~ ‘24. 5.

○ 육상공사(해양레저체험센터) 착공: ‘24. 7.

※‘25.9월말 기준 공정율 59%(지상1층 골조 완료)

4. 사업개요

○ 기  간: 2019. ~ 2026.

○ 위  치: 서귀포시 서귀동 758-2번지 일원

○ 내  역: (해상)파제제 및 호안확장, (육상)해양레저체험센터

○ 공정률: 전체 공정율 79%(해상 100%, 육상 59%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		44,000	40,000	4,000	2,000	2,000
공사비	파제제, 호안확장, 해양레저 체험센터	40,400	36,400	4,000	2,000	2,000
감리비		3,300	3,300
부대비		300	300

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		44,000		40,000		4,000
공사비	파제제, 호안확장, 해양레저 체험센터	40,400	파제제, 호안확장, 해양레저 체험센터	36,400	해양레저 체험센터	4,000
감리비		3,300		3,300
부대비		300		300

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	44,000	40,000	4,000
국 비	22,000	20,000	2,000
지 방 채	14,000	12,000	2,000
시 도 비	8,000	8,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주 해양자원을 활용한 해양레저관광 인프라 구축을 통해 스쿠버다이빙 등 해양레저 여건을 최적화하여 방문객 유입 증가에 따른 지역경제 활성화 도모

18		지방어항건설(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 어항시설 건설 및 보강으로 다기능 복합어항 개발, 해양레저 산업활성화 등

- 지방어항 기본시설 건설 및 정비, 지방어항 내진성능평가 등을 통한 어선 안전수용 및 해양레저 활성화

○ 이상기후로 인한 자연재해(태풍, 해일 등) 사전 예방 및 지속가능한 어업환경 조성 필요

2. 지방채 발행계획: 4,500백만원

3. 추진경위

○ 19개 지방어항 지정 고시: 1972. 3월 ～ 2018. 10월

○ 제1차 지방어항 개발계획변경 용역 및 고시(8개항): 2012년

○ 제2차 지방어항 개발계획변경 용역 및 고시(10개항): 2014년

○ 국가어항 1개소(하효항) 지방어항으로 전환: 2018년

※ 균특지방 이양예산 확보 범위에서 매년 어항별 사전 행정절차 이행 중

- 제주시 동부지역 내진성능평가 용역 실시(4개항): 2023.3～6월

- 서귀포시 동부지역 내진성능평가 용역 실시(2개항): 2023.4～6월

- 제4차 제주특별자치도 공유수면매립 기본계획(변경) 반영: 2023.7월

○ 투자심사: 2024. 10. 21.(총사업비 287억원)

4. 사업개요

○ 기  간: 2025년 1월 ～ 2029년 12월(5개년)

○ 위  치: 제주특별자치도 내 지방어항 19개항

○ 내  역: 지방어항 개발계획변경, 공간적합성 및 해역이용협의, 기본 및 실시설계 용역

○ 공정률: 18.8%(총사업비 287억원 중 54억원 기 편성)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		28,350	5,400	4,500	-	4,500	-	-	-	18,450
공사비	개발계획 변경 및 시설 개선·정비 1식	26,350	5,000	4,100	-	4,100	-	-	-	17,250
감리비	시공감리 1식	2,000	400	400	-	400	-	-	-	1,200
부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	개발계획 변경 및 실행 15개항	28,350	개발계획 변경 및 실행 3개항	5,400	개발계획 변경 및 실행 3개항	4,500	개발계획 변경 및 실행 9개항	18,450
공사비		26,350		5,000		4,100		17,250
감리비		2,000		400		400		1,200
부대비		-		-		-		-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	28,350	5,400	4,500	18,450
국 비	0
지 방 채	4,500		4,500
시 도 비	23,850	5,400		18,450

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 어촌‧어항 주변 지역주민의 경제 생활권 확보 및 어업기반시설 제공으로 어가 소득 증대와 다목적 기능항 역할을 통한 어촌관광 인프라 구축

○ 어항 운영 및 시설보수 등에 따른 직·간접 고용창출 효과 발생과 어항시설 이용의 다변화로 인한 신규사업 창출 기대

19		제주특별자치도 보훈회관 건립 사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도지사 공약사업으로 도내 보훈단체의 오랜 숙원사업이며, 전국 광역지자체 보훈회관 중 제주가 가장 노후화(‘68년 건립)

- 누수, 단열불량 등에 따른 안전성 문제 대두 및 사무환경 열악으로 고령의 유공자들의 건강 악화 우려

○ 도내에 산재한 9개 보훈단체 사무실의 통합화 및 편의시설 설치 등 필요

2. 지방채 발행계획: 3,400백만원

3. 추진경위

○ 2020년 정기 제3차 지방재정 투자심사(결과: 적정): ‛20. 10. 20.

○ 2020년 제7회 공유재산심의회(심사결과: 의결): ‛20. 10. 26.

○ 2021년 공유재산관리계획안 도의회(389회) 상정(결과: 의결): ‛20. 12. 15.

○ 공공건축 사전검토(국가공공건축지원센터): ‛21. 3. 12.

○ 국비(총 15억원) 지원 관련 건립 사업계획 제출(국가보훈처): ‛21. 4.

○ 제주특별자치도 공공건축 심의위원회 심의(결과: 조건부 의결): ‛21. 5. 10.

○ 설계공모 공고(도시디자인담당관): ‛21. 5. 31. ~ ‛21. 8. 18.

○ 기본 및 실시설계 용역 계약: ‛21. 9. 8.

○ 총사업비 증가(30%이상)에 따른 설계용역 등 중단: ‛22. 5. 17.

○ 투자(재)심사, 공유재산(재)심의(‛22.8) 및 공유재산관리계획(변경)(‛22.12.)

○ 보훈회관 건립 기본 및 실시설계용역 완료: ‛22.12.

○ 계약심의, 일상감사, 건설기술심의, 계약심사 완료: ‛23.2. ~ ‛23.5.

○ 보훈회관 건립 공사(전기․통신․소방/건축) 계약: ‛23.6.21./‛23.6.26.

※ 공사 착공 및 준공: ‛23. 7. 24. ~ ‛24. 10 .15.(일시중지: 공사감리자 미배치)

○ 건설사업관리용역(책임감리) 계약: ‛23. 9. 8.

○ 건설사업관리용역(책임감리) 용역 착수 및 공사재개: ‛23. 10. 10.

○ 공사기간 연장 등 설계변경 시행: ‘24. 7. 16.

- (변경전)‘23.10.10.~‘24.12.31.   (변경후)‘23.10.10.~‘25.10.31.(10개월 연장)

○ 건축공사 1차분 준공 및 2차분 시행: ‘24. 11. 15.

○ 공사기간 적정성 평가를 위한 기술자문위원회 개최: ‛25. 8. 28.

- 회의결과: 2026년 10월 15일 적정 준공예정일로 자문

○ 공사기간 연장 등 설계변경 시행: ‘25. 9. 10.

- (변경전)‘23.10.10.~‘25.10.31.   (변경후)‘23.10.10.~‘26.10.15.(11.5개월 연장)

○ 지하층 철근콘크리트공사 진행중: 공정률 37% (9월말 기준)

4. 사업개요

○ 기  간: 2020.10. ~ 2026. 10.

○ 위  치: 제주시 광양7길 19 (구 보훈지청, 현 보훈민원센터)

○ 내  역: 보훈회관 건립 1동

- 지하2층, 지상8층 (연면적 3,369.65㎡) *주차장 44대(지상 8대, 지하기계식 36대)

○ 공정률: 37% (‘25. 9월말 기준)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		21,797	18,036	3,761		3,400	361
	보훈회관 건립1동
시설비		18,534	16,113	2,421		2,400	21			-
감리비		2,946	1,896	1,050		1,000	50			-
부대비		27	27							-
자산취득비		290		290			290

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		21,797		18,036		3,761
시설비	건축,토목,전기,통신,소방 등 공사 1식	18,534	1차수 공사대금 및 2차수 공사 선금 1식	16,113	2차수 준공금 1식	2,421
감리비	건설사업관리(책임감리) 1식	2,946	감리비 1, 2차분	1,896	감리비 3차수 대금 1식	1,050
부대비	검토 및 인증수수료 1식	27	검토 및 인증수수료 1식	27
자산 취득비	사무 가구 및 기기 1식	290			사무 가구 및 기기 1식	290

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	21,797	18,036	3,761		미편성예산 (보상비, 예비비등) 제외
국 비	1,500	1,500
지 방 채	4,821	2,400	3,400
시 도 비	15,476	14,136	361

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 통합 공간 확보를 통해 보훈단체 운영·관리의 효율성 제고

○ 국가유공자 예우 및 보훈가족의 복지향상을 통한 도민의 애국심 함양 및 나라사랑정신 기틀 확립 기여

20		문화예술공공수장고 증축공사

1. 사업목적 또는 필요성

○ ‘19.6. 전국 지자체 최초로 문화예술공공수장고를 건립하였으나, 급격한 수장작품 증가로 수장공간 포화*로 인하여 문화예술공공수장고 시설 확충 필요

* 현재 수장률: 101% 초과 (‘25. 10. 기준)

○ 공공수장고 공간 확보 및 보존처리실(지류 및 조각 등) 필요

2. 지방채 발행계획: 6,300백만원

3. 추진경위

○ 2021. 9. ~ 2022.  3.: 수장고 시설 확충 타다성 용역(도 문화정책과)

○ 2022. 3. ~ 2022. 12.: 문화예술공공수장고(증축) 공공건축 기획 및 설계공모

○ 2022.12. ~ 2024. 12.: 기본 및 실시설계 용역

○ 2023. 6.: 2023년 제3차 지방재정투자심사 심의(사유: 총사업비 변경)

* 심사기관 변경(당초: 시·도 심사 → 변경: 중앙심사)

○ 2023. 10.: 공유재산심사 및 관리계획(재심사) 완료(결과: 의결)

○ 2023. 11.: 2023년 제4차 지방재정투자심사 심의(결과: 재검토)

* 재검토 사유: 문체부 미술관 설립 타당성 사전평가 추진

○ 2024. 11.: 문체부 미술관 설립타당성 사전평가 심의(결과: 통과)

○ 2024. 12.: 도 회계재산관리과 계약심사(결과: 통과) 및 감사위원회 일상감사 심사*

* 일상감사 심의 의견: (보류) 예산미확로 일상감사 반려 ⇒ 예산확보 후 재심사 예정

○ 2025. 3.: 2025년 제1차 지방재정투자심사(제주) 완료(결과: 조건부 통과)

* 조건부 의견: 중기지방재정계획 수정 반영 요청

○ 2025. 9.: 2026 ~ 2030년 중기지방재정계획 수립 관련 수정 반영(총사업비 증액)

4. 사업개요

○ 기  간: 2022. 1. ~ 2027.12.  * 본 공사기간: 2026. 3. ~ 2027. 7. 예정

○ 위  치: 제주시 한경면 저지리 2114-197 (문화예술공공수장고)

○ 내  역: 공공수장고 시설 확충(증축)* 공사 1식 (연면적 1,689㎡, 지상 1층)

* 수장고 4실, 보존처리실 2실, 수장자료실 등

○ 공정률: 0% (관련행정절차 이행 및 예산반영 후 2026년 본공사 진행 예정)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		12,000	360	6,300		6,300		-	-	5,340
공사비	증축 공사 1식	10,250	-	5,800		5,800		-	-	4,450
감리비	공사 감리비	896	-	460		460		-	-	436
부대비	실시설계비 및 각종 행정절차비, 전시공간 구성 등	854	360	40		40		-	-	454

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		12,000		360		7,000		4,640
공사비	증축 공사 1식 건축, 토목, 기계, 소방, 전기 포함	10,250	-	-	증축 공사 1식 건축, 토목, 기계, 소방, 전기 포함	6,300	증축 공사 1식 건축, 토목, 기계, 소방, 전기 포함	3,950
감리비	공사 감리비	896	-	-	공사 =감리비	660	공사 감리비	236
부대비	실시설계비 및 각종 행정절차비 전시공간 구성 등	852	설계비 및 각종행정절차비 등	360	기타 부대비	40	전시공간 구성비	472

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	12,000	360	6,300	5,340
국 비	-	-	-	-
지 방 채	7,800	-	6,300	1,500
시 도 비	4,200	360	-	3,840

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 수장작품을 일반에 공개하여(관람형 수장고) 도민 문화향유 기회 확대

○ 수장고 확충을 통한 미술품 격납체계 구축 및 보존·복원 전문공간 확보로 제주문화자산의 안정적인 보존 및 활용

○ 안정적인 작품 수장환경 조성 및 연구·관리를 기반으로 도내 수장고 포화를 해결할 수 있는 제주권역수장보존센터 역할 기대

21		바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 광역 음식물류 폐기물 자원화시설에서 발생되는 바이오가스를 활용한 청정수소 생산시설 구축으로 순환경제·무탄소 에너지 대전환 기여

2. 지방채 발행계획: 3,200백만원

3. 추진경위

○ 청정수소 생산시설 구축 타당성 검토 용역 추진 (`24.8.~12.)
- 사업 기본 구상, 제도적 제약 여부, 시설 및 운영 방안 등

○ 제주 민생토론회 시 청정수소 생산시설 구축 국비지원 건의 (`24.10.15.)
- 2025년 사업 공모계획으로 제주도가 신청시 적극 지원(VIP,환경부)

○ 관계기관, 주민 수용성 제고 노력 및 공모 준비 (`24.12.~`25.3.)

○ 공모사업 최종 선정(`25.3.28.) 및 업무 협약 체결(`25.4.22.)
- 협약 당사자 : 환경부(총괄) + 제주특별자치도(주관) + 한국환경공단(전담)

○ 협약 체결(도-한국환경공단)(`25.7.4.) 및 입찰안내서(Turn-key) 작성 용역중

4. 사업개요

○ 기  간: 2025. ~ 2028.

○ 위  치: 서귀포시 색달동 산 6-2 (부지면적: 13,400㎡, 연면적: 875㎡)

○ 내  역: 바이오가스 기반 청정수소 생산시설 구축 (청정수소 500kg/일 생산)
- 관리동, 압축/저장/출하 설비동, 고질화·개질화 설비동 등

○ 공정률: 0% (`27. 착공예정)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치사업	청정수소 (500kg/일) 생산시설 구축	13,000	715	12,285	8,600	3,200	485	-	-	3,705

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
		13,000		715		8,580		3,705
바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치사업	청정수소 (500kg/일) 생산시설 구축	13,000	-기본계획 및 입찰안내서 작성 1식 -토질 및 측량조사 용역 1식	715	-기본 및 실시설계 1식 -시설공사 1식	8,580	-시설공사 1식	3,705

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	13,000	715	8,580	3,705
국 비	9,100	500	6,000	2,600
지 방 채	2,580	-	3,200	-
시 도 비	1,320	215	485	1,105

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 음식물류 폐기물 자원을 활용한 지역 자립형 미래 에너지 생산/보급으로 제주 그린수소 글로벌 허브 조성 및 무탄소 에너지 전환 선도 도시 실현

22		고도정수처리시설 사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ ‘정수장 취수원 주변에 농□축산업을 비롯한 개발사업 증가와 급격한 인구 유입으로 취수량의 증가 등 환경변화에 따라 정수처리시설이 미흡한 정수장에 고도정수처리시설을 설치 도민에게 안전한 수돗물을 공급하기 위함

2. 지방채 발행계획: 8,500백만원

3. 추진경위

(조천정수장)

○ ('21. 12.) 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ('22. 08.) 막공법 기술사용 협약체결

○ ('23. 05.) 설계의 경제성(VE) 검토, 안전성검토 완료

○ ('23. 07.) 공사원가 사전검토, 일상감사 등 행정절차 이행

○ ('23. 12.) 건설사업관리 용역 착수

○ ('23. 12.) 시설공사(토목, 건축, 기계), 전기공사 착공

○ ('24. 10.) 시설공사(소방, 통신) 착공

○ ('25. 07.) 조천정수장 고도정수처리시설사업 추진 중(공정율 40%)

(토평정수장)

○ ('21. 12.) 기본 및 실시설계 용역 착공

○ ('22. 08.) 막공법 기술사용 협약체결

○ ('23. 05.) 설계의 경제성(VE) 검토, 안전성 검토 완료

○ ('23. 07.) 공사원가 사전검토, 일상감사 등 행정절차 이행

○ ('23. 11.) 건설사업 관리용역 착수

○ ('23. 11.) 시설공사(토목, 건축, 기계), 전기공사 착공

○ ('25. 07.) 토평정수장 고도정수처리시설사업 공사 추진 중(공정율 75%)

4. 사업개요

(조천정수장)

○ 기    간 :  2021.  10. ～  2027.  12.(7개년)

○ 총사업비 : 51,091백만원

○ 내    역 : 고도정수처리시설(Q=37,000㎥/일)

(토평정수장)

○ 기    간: 2021년 ∼ 2025년 (5개년)

○ 총사업비: 267억원

○ 위    치: 서귀포시 토평동 토평정수장

○ 내    역: 고도정수처리시설(Q=12,400㎥/일)

< 사업총괄 >

(조천정수장)	(단위: 백만원)

공 종 별	사 업 량	사 업 비
		합계	기투자	2026계획	2027이후
합 계		51,901	23,547	13,772	13,772
조천정수장 고도정수처리시설 사업	○고도정수처리시설 (Q=37,000㎥/일) 1식	51,091	23,547	13,772	13,772

(토평정수장)

(단위: 백만원)

공 종 별	사 업 량	사 업 비
		합계	기투자	2026계획	2027이후
합 계		26,790	16,329	10,461	-
토평정수장 고도정수처리시설 사업	○고도정수처리시설 (Q=12,400㎥/일) 1식	26,790	16,329	10,461

< 연도별·공종별 투자계획 >

(조천정수장)                                                   (단위: 백만원)

공 종 별	합 계		기 투 자		2026계획		2027이후
	물 량	사업비	물 량	사업비	물 량	사업비	물 량	사업비
합 계
조천정수장 고도정수처리시설 사업	○고도정수처리시설(Q=37,000㎥/일) 1식	51,091	○고도정수처리시설(Q=37,000㎥/일) 1식	23,547	○고도정수처리시설(Q=37,000㎥/일) 1식	13,772	○고도정수처리시설(Q=37,000㎥/일) 1식	13,772

(토평정수장)                                                   (단위: 백만원)

공 종 별	합 계		기 투 자		2026계획		2027이후
	물 량	사업비	물 량	사업비	물 량	사업비	물 량	사업비
합 계	26,790	26,790		16,329		10,461	-	-
토평정수장 고도정수처리시설 사업	○고도정수처리시설(Q=12,400㎥/일) 1식	26,790	○고도정수처리시설(Q=12,400㎥/일) 1식	16,329	○고도정수처리시설(Q=12,400㎥/일) 1식	10,461

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	74,881	39,876	21,233	13,772
국 비	3,504	3,504	-	-
지 방 채	8,500	-	8,500	-
시 도 비	62,877	36,372	12,733	13,772

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 조속한 고도정수처리시설 도입으로 급수구역 안전한 수돗물 공급체계 구축

○ 취수원 주변의 급변하는 여건변화에 능동적 대처 가능

23		노후 상수관망 정비사업

□ 애월읍 노후상수관망 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 애월읍 지역의 노후 상수관망 정비로 녹물발생 등을 방지하고, 누수저감을 통한 안정적 수돗물 공급으로 가뭄 등에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라,

○ 블록 및 유지 관리시스템 도입을 통한 체계적･효율적 관망관리체계를 구축하여 수도사업의 선순환 구조 유도 및 상수도 경영 개선

2. 지방채 발행계획: 4,000백만원

3. 추진경위

○ 제주시 애월읍 노후상수관망 정비사업 위․수탁 협약체결(K-water : 2022. 11. 22.)

- 제주시 애월읍 4개 소블록(신엄, 장전, 고성, 소길) 관망정비 등(총사업비 376억 원, ’23∼’28)

○ 2023년 노후상수관망 정비사업 추진(18억 원)

○ 2024년 노후상수관망 정비사업 추진(68억 원)

○ 2025년 노후상수관망 정비사업 추진(80억 원)

4. 사업개요

○ 기    간: 2023년 ∼ 2028년 (6개년)

○ 총사업비: 376억 원

○ 위    치: 제주특별자치도 애월읍 일원

○ 내    역: 목표유수율 85%

- 관망정비 60.7km, 노후수도미터 교체 595전, 누수탐사/복구 1식 등

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계
공사비	○ 관망정비 60.7km ○ 노후수도미터 교체 595개소 ○ 누수탐사/복구 1식 등	37,584	16,590	10,184	3,570	4,000	2,614			10,812

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		37,586		16,590		10,184		10,812
공사비	○ 관망정비 60.7km ○ 노후수도 미터교체 595전 ○ 누수탐사/ 복구 1식 등	37,586	○ 관망정비 60.7km ○ 노후수도 미터교체 595전 ○ 누수탐사/ 복구 1식 등	16,590	○ 관망정비 60.7km ○ 노후수도 미터교체 595전 ○ 누수탐사/ 복구 1식 등	10,184	○ 관망정비 60.7km ○ 노후수도 미터교체 595전 ○ 누수탐사/ 복구 1식 등	10,812

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	37,586	16,590	10,184	10,812
국 비	12,593	12,593	-	-
지 방 채	4,000	-	4,000	-
시 도 비	20,993	3,997	6,184	10,812

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후상수도관 교체사업을 통해 유수율 향상 조기 실현

○ 유수율 향상을 통한 수돗물 생산원가 절감 등 수도사업 경영 합리화 도모

□ 구좌·성산 노후상수관망 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 구좌․성산읍 지역의 노후 상수관망 정비로 녹물발생 등을 방지하고, 누수저감을 통한 안정적 수돗물 공급으로 가뭄 등에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라,

○ 블록 및 유지 관리시스템 도입을 통한 체계적･효율적 관망관리체계를 구축하여 수도사업의 선순환 구조 유도 및 상수도 경영 개선

2. 지방채 발행계획: 8,000백만원

3. 추진경위

○ 구좌․성산 노후상수관망 정비사업 위․수탁 협약체결(K-water : 2022. 3. 26.)

- 제주시 구좌읍 10개 소블록 및 서귀포시 성산읍 2개 소블록 관망정비 등(총사업비 460억 원, ’24∼’29)

○ 2024년 노후상수관망 정비사업 추진(69억 원)

○ 2025년 노후상수관망 정비사업 추진(12억 원)

4. 사업개요

○ 기    간: 2024년 ∼ 2029년 (6개년)

○ 총사업비: 460억 원

○ 위    치: 제주특별자치도 제주시 구좌읍 및 서귀포시 성산읍 일원

○ 내    역: 목표유수율 85%

- 관망정비 89.6km, 노후수도미터 교체 1,500전, 누수탐사/복구 1식 등

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계
공사비	○ 관망정비 89.6km ○ 노후수도 미터교체 1,500전 ○ 누수탐사/ 복구1식 등	46,048	18,865	19,937	5,991	8,000	5,946			7,246

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		46,048		18,865		19,937		7,246
공사비	○ 관망정비 89.6km ○ 노후수도 미터교체 1,500전 ○ 누수탐사 /복구 1식	46,048	○ 관망정비 89.6km ○ 노후수도 미터교체 1,500전 ○ 누수탐사 /복구 1식	18,865	○ 관망정비 89.6km ○ 노후수도 미터교체 1,500전 ○ 누수탐사 /복구 1식	19,937	○ 관망정비 89.6km ○ 노후수도 미터교체 1,500전 ○ 누수탐사 /복구 1식	7,246

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	46,048	18,865	19,937	7,246
국 비	23,024	13,410	5,991	3,623
지 방 채	8,000		8,000
시 도 비	15,024	5,455	5,946	3,623

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후상수도관 교체사업을 통해 유수율 향상 조기 실현

○ 유수율 향상을 통한 수돗물 생산원가 절감 등 수도사업 경영 합리화 도모

□ 사라·별도봉 중블록 노후상수관망 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주시 용담․삼도․건입동 등 지역의 노후 상수관망 정비로 녹물발생 등을 방지하고, 누수저감을 통한 안정적 수돗물 공급으로 가뭄 등에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라,

○ 블록 및 유지 관리시스템 도입을 통한 체계적･효율적 관망관리체계를 구축하여 수도사업의 선순환 구조 유도 및 상수도 경영 개선

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 제주시 사라․별도봉중블록 노후상수관망 정비사업 위․수탁 협약체결(K-water : 2022. 11. 22.)

- 사라․별도봉중블록 9개 소블록 관망정비 등(총사업비 438억 원, ’25∼’30)

○ 2025년 노후상수관망 정비사업 추진(23억 원)

4. 사업개요

○ 기    간: 2025년 ∼ 2030년 (6개년)

○ 총사업비: 438억 원

○ 위    치: 제주특별자치도 제주시 용담․삼도․건입동 등 일원

○ 내    역: 목표유수율 85%

- 관망정비 70.9km, 누수탐사/복구 1식 등

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		46,048	2,293	17,467	7,687	2,000	7,780			24,098
공사비	○ 관망정비 89.6km ○ 노후수도 미터교체 1,500전 ○ 누수탐사/ 복구1식 등	46,048	2,293	17,467	7,687	2,000	7,780			24,098

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		43,858		2,293		17,467		24,098
공사비	○ 관망정비 70.9km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	43,858	○ 관망정비 70.9km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	2,293	○ 관망정비 70.9km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	17,467	○ 관망정비 70.9km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	24,098

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	43,858	2,293	17,467	24,098
국 비	9,880	2,193	7,687
지 방 채	14,049		2,000	12,049
시 도 비	19,929	100	7,780	12,049

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후상수도관 교체사업을 통해 유수율 향상 조기 실현

○ 유수율 향상을 통한 수돗물 생산원가 절감 등 수도사업 경영 합리화 도모

□ 영평 중블록 노후상수관망 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주시 일도․이도․도남동 등 지역의 노후 상수관망 정비로 녹물발생 등을 방지하고, 누수저감을 통한 안정적 수돗물 공급으로 가뭄 등에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라,

○ 블록 및 유지 관리시스템 도입을 통한 체계적･효율적 관망관리체계를 구축하여 수도사업의 선순환 구조 유도 및 상수도 경영 개선

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 제주시 영평중블록 노후상수관망 정비사업 위․수탁 협약체결(K-water : 2022. 11. 22.)

- 영평중블록 10개 소블록 관망정비 등(총사업비 487억 원, ’25∼’30)

○ 2025년 노후상수관망 정비사업 추진(25억 원)

4. 사업개요

○ 기    간: 2025년 ∼ 2030년 (6개년)

○ 총사업비: 487억 원

○ 위    치: 제주특별자치도 제주시 일도․이도․도남동 등 일원

○ 내    역: 목표유수율 85%

- 관망정비 75.1km, 누수탐사/복구 1식 등

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		48,674	2,534	21,522	9,594	2,000	39,928			24,618
공사비	○ 관망정비 75.1km ○ 누수탐사/복구 1식 등	48,674	2,534	21,522	9,594	2,000	9,928			24,618

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		48,674		2,534		21,522		24,618
공사비	○ 관망정비 75.1km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	48,674	○ 관망정비 75.1km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	2,534	○ 관망정비 75.1km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	21,522	○ 관망정비 75.1km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	24,618

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	49,511	3,371	21,522	24,618
국 비	24,337	2,434	9,594	12,309
지 방 채	2,000		2,000
시 도 비	23,174	937	9,928	12,309

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후상수도관 교체사업을 통해 유수율 향상 조기 실현

○ 유수율 향상을 통한 수돗물 생산원가 절감 등 수도사업 경영 합리화 도모

□ 동홍·삼매봉 중블록 노후상수관망 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 동홍․송산동 등 지역의 노후 상수관망 정비로 녹물발생 등을 방지하고, 누수저감을 통한 안정적 수돗물 공급으로 가뭄 등에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라,

○ 블록 및 유지 관리시스템 도입을 통한 체계적･효율적 관망관리체계를 구축하여 수도사업의 선순환 구조 유도 및 상수도 경영 개선

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 서귀포시 동홍․삼매봉중블록 노후상수관망 정비사업 위․수탁 협약체결(K-water : 2022. 11. 22.)

- 동홍삼매중블록 11개 소블록 관망정비 등(총사업비 496억 원, ’25∼’30)

○ 2025년 노후상수관망 정비사업 추진(26억 원)

4. 사업개요

○ 기    간: 2025년 ∼ 2030년 (6개년)

○ 총사업비: 496억 원

○ 위    치: 제주특별자치도 서귀포시 동홍․송산동 등 일원

○ 내    역: 목표유수율 85%

- 관망정비 71.2km, 누수탐사/복구 1식 등

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		49,588	2,580	18,832	8,226	2,000	8,606			28,176
공사비	○ 관망정비 71.2km ○ 누수탐사/복구 1식 등	49,588	2,580	18,832	8,226	2,000	8,606			28,176

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		49,588		2,580		18,832		28,176
공사비	○ 관망정비 71.2km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	49,588	○ 관망정비 71.2km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	2,580	○ 관망정비 71.2km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	18,832	○ 관망정비 71.2km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	28,176

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	49,588	2,580	18,832	28,176
국 비	24,794	2,480	8,226	14,088
지 방 채	2,000		2,000
시 도 비	22,794	100	8,606	14,088

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후상수도관 교체사업을 통해 유수율 향상 조기 실현

○ 유수율 향상을 통한 수돗물 생산원가 절감 등 수도사업 경영 합리화 도모

□ 남원대블록 노후상수관망 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 남원읍 지역의 노후 상수관망 정비로 녹물발생 등을 방지하고, 누수저감을 통한 안정적 수돗물 공급으로 가뭄 등에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라,

○ 블록 및 유지 관리시스템 도입을 통한 체계적･효율적 관망관리체계를 구축하여 수도사업의 선순환 구조 유도 및 상수도 경영 개선

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 서귀포시 남원대블록 노후상수관망 정비사업 위․수탁 협약체결(K-water : 2022. 11. 22.)

- 남원대블록 10개 소블록 관망정비 등(총사업비 416억 원, ’25∼’30)

○ 2025년 노후상수관망 정비사업 추진(26억 원)

4. 사업개요

○ 기    간: 2025년 ∼ 2030년 (6개년)

○ 총사업비: 416억 원

○ 위    치: 제주특별자치도 서귀포시 동홍․송산동 등 일원

○ 내    역: 목표유수율 85%

- 관망정비 77.9km, 누수탐사/복구 1식 등

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		41,570	2,178	14,934	6,478	2,000	6,456			24,458
공사비	○ 관망정비 77.9km ○ 누수탐사/복구 1식 등	41,570	2,178	14,934	6,478	2,000	6,456			24,458

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		41,570		2,178		14,934		24,458
공사비	○ 관망정비 77.9km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	41,570	○ 관망정비 77.9km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	2,178	○ 관망정비 77.9km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	14,934	○ 관망정비 77.9km ○ 누수탐사 /복구 1식 등	24,458

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	41,570	2,178	14,934	24,458
국 비	20,785	2,078	6,478	12,229
지 방 채	2,000		2,000
시 도 비	18,785	100	6,456	12,229

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후상수도관 교체사업을 통해 유수율 향상 조기 실현

○ 유수율 향상을 통한 수돗물 생산원가 절감 등 수도사업 경영 합리화 도모

24		동지역 유수율 제고사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주특별자치도 동지역(제주시, 서귀포시) 유수율 제고를 위한 상수관망블록, 유지관리시스템 도입으로 체계적‧효율적 관망관리 체계를 구축하여 안정적인 수돗물 공급 및 상수도 경영개선

2. 지방채 발행계획: 1,500백만원

3. 추진경위

○ 동지역 상수도 유수율 제고 위탁사업 협약체결(K-water : 2019. 12. 26.)

- 제주시, 서귀포시 동지역 유수율 제고 사업(총사업비 1,326억 원, ’20∼’26)

○ 2020년 유수율 제고사업 추진(120억 원)

○ 2021년 유수율 제고사업 추진(60억 원)

○ 2022년 유수율 제고사업 추진(203억 원)

○ 2023년 유수율 제고사업 추진(150억 원)

○ 2024년 유수율 제고사업 추진(215억 원)

○ 2025년 유수율 제고사업 추진(160억 원)

4. 사업개요

○ 기    간: 2020년 ∼ 2026년 (6개년)

○ 총사업비: 1,326억 원

○ 위    치: 제주특별자치도 동(洞)지역 일원

○ 내    역: 목표유수율 75%

- 블록구축 106개소, 관망정비 672.1km, 유지관리시스템 구축 1식,

누수탐사/복구 1식 등

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		132,638	90,800	41,838	6,000	1,500	83,300
공사비	유수율 제고 사업 1식	132,638	90,800	41,838	6,000	1,500	83,300

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계
공사비	○ 블록구축 106개소 ○ 관망정비 672.1km ○ 유지관리 시스템 구축 1식 ○ 누수탐사/ 복구 1식 등	132,638	○ 블록구축 106개소 ○ 관망정비 672.1km ○ 유지관리 시스템 구축 1식 ○ 누수탐사/ 복구 1식 등	90,800	○ 블록구축 106개소 ○ 관망정비 672.1km ○ 유지관리 시스템 구축 1식 ○ 누수탐사/ 복구 1식 등	41,838

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	132,638	90,800	41,838	0
국 비	6,000	6,000
지 방 채	48,500	47,000	1,500
시 도 비	78,138	37,800	40,338

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후상수도관 교체사업을 통해 유수율 향상 조기 실현

○ 유수율 향상을 통한 수돗물 생산원가 절감 등 수도사업 경영 합리화 도모

25		하수처리장 증설사업

□ 제주하수처리장 현대화사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주도 상주인구 및 관광객의 급격한 증가로 환경기반 인프라시설의 한계에 직면하고 있어 쾌적한 생활환경 및 연안지역 수질오염 예방 등 제주도의 청정이미지 구축 및 지역발전 도모를 위해 현대화사업이 시급히 요구되는 실정

○ 도내 전체 하수처리량의 약 60%를 차지하고 있는 대표 처리장으로서 제주 최대 현안인 환경문제 해결을 위한 현대화시설로의 탈바꿈 및 변화 필요

2. 지방채 발행계획: 50,000백만원

3. 추진경위

○ 제주특별자치도 광역하수도정비기본계획(변경) 승인(환경부): '18. 6.

○ 제주공공하수처리시설 현대화사업 기본방향 수립 : '18. 12.

○ 예비타당성 조사 면제 결정: '19. 1. 29

○ 건설사업관리(CM) 위수탁 시행(도→한국환경공단): '19. 2. 27

○ 사업계획 적정성 검토(KDI): '19. 8. 22.

○ 건설공사 기본계획 고시: '19. 9. 27

○ 대형공사 입찰방법 심의(제주특별자치도 건설기술심의위원회): '19. 10. 30

○ 재원협의 신청(도→영산강유역환경청): '21. 02. 09

○ 총사업비 조정요구서 제출(영산강유역환경청→환경부): '21. 05. 20

○ 총사업비 조정심의 승인통보(환경부→도): '21. 07. 20

○ 시설공사 입찰공고(설계시공 일괄입찰): '22. 02. 25

○ 시설공사 기본설계: '22. 03. 31. ~ 08. 28.

○ 시설공사 입찰참가 등록 및 기본설계도서 제출: '22. 08. 29.

○ 실시설계 적격자 선정 및 실시설계 착수(금호 컨소시엄): '22. 10. 11.

○ 실시설계도서 제출: '23. 01. 09.

○ 시설공사 착공: '23. 04. 28.

○ 어업피해조사 및 보상 시행: '24. 7. ~ '25. 12.

○ 2025. 7월 현재: 1단계 구간 수처리시설, 통합관리동, 통합배축구(8월 완공),

해양방류관(12월 완공) 시공중     * 전체공정률(47%)

4. 사업개요

○ 기    간 : 2019년 ～ 2027년(9개년)

○ 총사업비 : 438,566백만원

○ 내    역 : 현대화 22만톤/일(기존 13만톤/일, 증설 9만톤/일)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		508,566	225,738	228,300	74,400	50,000	103,900			54,528
공사비	하수처리장 현대화사업 1식	508,566	225,738	228,300	74,400	50,000	103,900			54,528

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		438,566		225,738		225,738		54,527
공사비	현대화 22만㎥/일	438,566	‧기본계획 및 입찰안내서 작성 1식 ‧각종 영향 평가용역 1식 ‧기본 및 실시설계 1식 ‧시설공사 1식	225,738	시설공사 1식	225,738	시설공사 1식	54,527

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	508,566	225,738	228,300	54,528
국 비	205,068	107,471	74,400	23,197
지 방 채	183,998	113,681	50,000	20,317
시 도 비	119,500	4,586	103,900	11,014

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 급증하는 상주인구 및 관광객에 대비한 안정적인 하수처리 인프라의 확충

○ 방류해역의 수질보전 및 수질개선

□ 동부하수처리장 현대화사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 동부하수처리구역내 유입인구와 건축행위 증가로 하수발생량 급증 및 하수처리장 가동율 100% 초과에 따라 하수처리 운영한계 및 처리용량 증설시급

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ '17.  7. : 공공하수도설치(변경) 고시, 재원협의 완료, 증설공사 발주

○ '17.  8. : 기본 및 실시설계 완료 및 증설공사(1차분) 착공(’17. 09.)

○ '20. 10. : 김녕리 주민지원사업 협약체결

○ '23.  6. : 도지사 ↔ 월정마을회 증설사업 정상화 발표 및 공사재개

○ '24.  3. : 증설공사(1차분) 준공 및 2차분 발주

○ '24.  4. : 고시효력 집행정지 인용에 따른 증설공사 일시중지(4차)

○ '24. 10. : 총사업비 변경 승인(47억 증액)

○ '24. 11. : 항소심 승소(재개) 및 상고심 집행정지 인용(’24.12.)에 따른 공사중지

○ '25.  2. : 공공하수도 설치 무효고시 대법원 승소 및 공사재개

○ '25.  3. : 총사업비 국고보조금 부족분(2,144백만원) 반영

4. 사업개요

○ 기  간 : 2015년 ∼ 2026년

○ 위  치 : 제주시 구좌읍 월정리, 김녕리 일원

○ 내  역 : 하수처리장증설 12,000㎥/일, 차집관로정비 15.1㎞, 중계펌프장 개량 1식

○ 공정율 : 55%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		58,490	53,490	5,000		2,000	3,000
공사비	동부 하수처리장 현대화사업 1식	58,490	53,490	5,000		2,000	3,000

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		58,490		53,490		5,000
공사비	하수처리장증설 2,000㎥/일 차집관로 정비 15.1km	58,490	하수처리장증설 2,000㎥/일 차집관로 정비 15.1km	53,490	하수처리장증설 2,000㎥/일 차집관로 정비 15.1km	5,000

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	58,490	53,490	5,000	0
국 비	23,370	23,370
지 방 채	2,000		2,000
시 도 비	33,120	30,120	3,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 동부지역 하수발생량 증가에 안정적인 대처로 공중위생 향상 및 공공수역의 수질보전에 기여

○ 유입인구와 관광객 증가 및 하수처리구역 확대로 생활하수 처리를 위한 하수처리시설 증설을 추진하여 하수처리를 안정적으로 대처

26		하수관로 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 우·오수 미분류, 하수관로 노후로 오수 누수 및 연안해역 오염 등 도민 불편이 가중됨에 따라 하수 기반 시설 확충을 통한 생활환경 개선

○ (도두하수처리구역) 병문중계펌프장으로 초과 유입되는 하수를 용담중계펌프장으로 분산 이송함으로써 안정적 하수처리 기반 조성

2. 지방채 발행계획: 4,000백만원

3. 추진경위

1) 오라아라 하수관로 정비사업

- '18. 09. 06. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

- '19. 12. 18. : 오라‧아라(우선시행분) 하수관로 정비공사 착공

- '20. 06. 26. : VE검토용역 착수

- '20. 07. 15. : 건설기술심의

- '21. 10. 22. : 공공하수도 설치 고시

- '21. 10. 29. : 오라․아라(1공구) 하수관로 정비사업 착공

- '21. 12. 04. : 환경부 재원협의 완료(당초 334억 → 변경 415억)

- '21. 01. 04. : 오라․아라 하수관로 정비사업 건설사업 관리용역 착수

- '21. 06. 22. : 오라․아라(2공구) 하수관로 정비사업 착공

- '22. 01. 24. : 오라․아라(3공구) 하수관로 정비사업 착공

2) 남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계)

- '20. 6. 23. ~ ‘21. 6. 22. 실시설계 용역

- '23. 3. 본 공사(2, 3공구) 착공

- '24. 5. 30. 재원협의 검토의견서 최종 협의(한국환경공단)

- '24. 6. 19. 2공구 2024년 시행분 시행

- '24. 7. 25. 재원협의 완료

<총사업비 37,901백만원(증 5,367백만원) / 국 18,241(48.1%), 도 19,660(51.9%)>

- '24. 12. 9. 2024년 시행분 완료

- '25. 1. 10. 2025년 시행분 시행(2공구, 3공구)

- '25. 7.  4. 1공구 1공구계약심의 완료

- '25. 4. 24. 본 공사(1공구) 착공 및 2025년 시행분 시행

4. 사업개요

1) 오라·아라 하수관로 정비사업

○ 기  간 : 2018년 ∼ 2026년

○ 위  치 : 제주시 오라동, 아라동 일원

○ 내  역 : 하수관로 L=24.8㎞ 및 배수설비 2,265개소

○ 공정율 : 75.6%

2) 남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계)

○ 기  간 : 2020년 ~ 2027년

○ 위  치 : 서귀포시 남원읍, 표선면 일원

○ 내  역 : 하수관로 신설 L=22.1km, 배수설비 977가구, 맨홀펌프장 19개소

○ 공정율 : 37%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		60,396	51,993	11,607	3,596	4,000	4,011	0	0	11,410
공사비	오라·아라 하수관로 정비 1식	41,512	33,307	3,000		3,000
	남원처리구역 하수관로 정비 1식	18,884	18,686	8,607	3,596	1,000	4,011			11,410

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		79,208		51,993		11,607		11,410
공사비	오라·아라 하수관로 정비 1식	36,307	오라·아라 하수관로 정비 1식	33,307	오라·아라 하수관로 정비 1식	3,000
	남원처리구역 하수관로 정비 1식	38,703	남원처리구역 하수관로 정비 1식	18,686	남원처리구역 하수관로 정비 1식	8,607	남원처리구역 하수관로 정비 1식	11,410

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	81,799	60,396	9,993	11,410
국 비	35,449	26,458	3,596	5,395
지 방 채	4,000		4,000
시 도 비	42,350	33,938	2,397	6,015

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 동부지역 하수발생량 증가에 안정적인 대처로 공중위생 향상 및 공공수역의 수질보전에 기여

○ 유입인구와 관광객 증가 및 하수처리구역 확대로 생활하수 처리를 위한 하수처리시설 증설을 추진하여 하수처리를 안정적으로 대처

27		노후 차집관로 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주, 동부, 남원, 성산, 서귀포시 동지역 하수처리구역 노후 차집관로 정비 및 중계펌프장 부하량 저감을 위한 차집관로 정비사업을 통해 환경오염 및 안전사고 예방, 효율적인 하수처리를 도모

2. 지방채 발행계획: 14,000백만원

3. 추진경위

1) 동부하수처리구역 차집관로 정비사업

- ‘23. 3. 계약심사 및 건설기술심의 완료, 사업수행능력 세부평가기준(확정) 공고

- ‘23. 4. 사업수행능력평가 개최(책임기술인 기술능력 및 업무관리 능력 평가)

- ‘23. 6. 기본 및 실시설계용역 착수 *동명기술공단종합건축사사무소 외 2개사

- ‘24. 11. 설계 VE 이행회의

- ‘25. 02. 건설기술심의 등 행정절차 이행

- ‘25. 05. : 재원협의 요청

2) 남원하수처리구역 차집관로 정비사업

- ‘22. ~ ’25.: 건설사업관리 용역 시행(‘22. 11. 14. 계약체결)

- ‘23. ~ ’25.: 본 공사(1, 2공구) 착공(‘23. 1. 6. 계약체결)

- ‘24. 5./’24. 12.: 예산부족에 따른 일시정지(2공구/1공구)

- ‘24. 8. 재원협의 완료에 따른 총사업비 확정(20,208 → 21,584백만원)

- ‘25. 2. 2공구 공사 재개(관종선정에 따른 공사 지연)

- ‘25. 2. ~ 6. 일시정지 사유 해소에 따른 공사(1공구) 재개 지시(1~3차) 및 계약해지 요청

- ‘25. 6. ~ 7.: 1공구 공사 타절준공 및 잔여분 발주

- ‘25. 6. ~ 7.: 의귀리 공사 착공

3) 성산하수처리구역 차집관로 정비사업

- ‘22. 12. 국고보조사업 확정(환경부)

- ‘23.06.13. 기본 및 실시설계 용역 착수

- ‘23.12. 기본설계 및 실시설계 중

- ‘24.05. 행정절차 이행을 위한 용역 정지(`24. 5. 9. ~ )

- ‘24.11. 경제성 검토(VE)용역 및 건설기술심의 완료

- ‘25.07. 재원협의 추진중

4) 서귀포시 동지역 차집관로 정비사업

- ‘21. 09.∼’23. 12. 기본 및 실시설계 용역

- ‘23. 06.: 서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(1공구) 착공

- ‘23. 11. 서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(월류수처리시설) 착공

- ‘23. 03. 서귀포시 동지역 차집관로 정비사업 건설사업관리용역 착수

- ‘24. 07. 재원협의(영산강유역환경청) 재요청

- ‘24. 12. 2024년 시행분 준공

- ‘25. 01. 1공구, 월류수 처리시설 시행분 발주 및 공사 추진

- ‘25. 05. 서귀포시 동지역 차집관로 정비공사(월류수처리시설) 준공

- ‘25. 06. 재원협의(영산강유역환경청) 보완자료 제출(3차)

4. 사업개요

○ 기    간 : 2022. ～  2027. (5개년)

○ 총사업비 : 168,190백만원 (표준사업비)

○ 내    역 : 하수관로 신설 등 81.6km, 개보수 9.7km, 중계펌프장 개량·

증설 2개소, 월류수처리시설 신설 2개소 등

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		143,236	51,306	38,231	12,291	14,000	11,940	0	0	53,699
공사비	-동부처리구역	54,392	19,203	17,458	6,275	7,000	4,183			17,731
	-남원처리구역	27,519	17,378	6,750	602	2,000	4,148			3,391
	-성산처리구역	28,592	14,725	9,190	4,914	1,000	3,276			4,677
	-서귀포동지역	32,733		4,833	500	4,000	333			27,900

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		168,190		56,107		59,035		53,048
공사비	하수관로 신설 등 81.6km 개보수 9.7km 월류수처리시설 2개소 중계펌프장 증설 2개소	168,190	하수관로 신설 등 81.6km 개보수 9.7km 월류수처리시설 2개소 중계펌프장 증설 2개소	56,107	하수관로 신설 등 81.6km 개보수 9.7km 월류수처리시설 2개소 중계펌프장 증설 2개소	59,035	하수관로 신설 등 81.6km 개보수 9.7km 월류수처리시설 2개소 중계펌프장 증설 2개소	53,048

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	143,236	51,306	38,231	53,699
국 비	69,075	23,539	12,291	33,245
지 방 채	14,000		14,000
시 도 비	60,161	27,767	11,940	20,454

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 유지관리 개선, 중계펌프장 신설 및 증설로 인한 효과적인 오수처리, 노후된 하수관로 개량, 우천시 월류로 인한 악취방지, 공공수역의 수질개선 및 환경개선 효과 증대

28		연동 주민센터 청사 신축사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 연동 주민센터는 안전진단결과 C등급으로 시설 노후 및 청사공간 협소 등 청사 이용 불편이 가중되고 있는 실정으로 청사 신축을 통해 효율적인 업무공간 조성 및 주민편의 증진 필요

2. 지방채 발행계획: 12,000백만원

3. 추진경위

○ (‘21. 3. ~ 10.) 복합청사＊ 건립 타당성 조사 및 기본구상 용역 (道)

＊ 복합청사 : 연동주민센터, 제주기록원, 도로관리과, 건설회관 내 도청 7개부서

○ (‘22. 1. ~ 8.) 행정안전부 타당성 조사용역 실시 (사업면적 및 사업비 조정)

○ (‘22. 8.) 복합청사 사업비 큰 폭 상승으로 재검토 → 연동 청사 단독 추진 변경

○ (‘22.10.) 중기지방재정계획 반영

○ (‘24. 3.) 지방재정 중앙 투자심사 이행

○ (‘24. 5.) 공유재산관리계획안 의결

○ (‘24. 8.) 공공건축심의 완료

○ (‘24.12.) 설계공모 완료 및 실시설계용역 착수

○ (‘25. 9.) 일상감사, 건설기술심의 완료

○ (‘25.10.) 계약심사 의뢰

4. 사업개요

○ (사업기간) 2024년 ~ 2027년

○ (위    치) 제주시 연동 324-40번지 (前  도로관리과 부지, 대지면적 1,884.3㎡)

○ (사업내용) 업무시설(주민센터) 신축 1동 지하1·지상4층 연면적 4,148.55㎡

○ (공 정 률) 실시설계용역 추진중 (‘25.11월 착공예정)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		18,133	2,900	12,000	-	12,000	-	-	-	3,233
공사비	연면적 4 148.55㎡ (지하1,지상4)	15,233	1,800	10,500	-	10,500	-	-	-	2,933
설계비	설계용역 1식	900	900
감리비	공사감리 1식	2,000	200	1,500	-	1,500	-	-	-	300

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		18,133		2,900		12,000		3,233
공사비	연면적 4 148.55㎡ (지하1,지상4)	15,233	신축 1식	1,800	신축 1식	10,500	신축 1식	2,933
설계비	설계용역 1식	900	설계 1식	900
감리비	공사감리 1식	2,000	감리 1식	200	감리 1식	1,500	감리 1식	300

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	18,133	2,900	12,000	3,233
국 비	-	-	-	-
지 방 채	12,000	-	12,000	-
지 방 비	6,133	2,900	-	3,233

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주민센터 청사신축으로 행정수요 대응 및 행정서비스 질 향상

○ 복지·문화·평생교육의 장으로 지역화합 및 주민복지증진에 기여

29		신창·한원 자연재해위험개선지구 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 집중호우 시 세천의 수위상승 및 우수관거 통수단면이 부족하여 한경119센터 상류부에서 유입되는 우수로 인한 저지대 침수피해를 예방하기 위한 사업 필요

※ 사업시행 근거 :「자연재해대책법」제12조(자연재해위험개선지구의 지정 등)

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 2021.  4. 28. : 자연재해위험개선지구 지정 고시

○ 2022.  2월 : 행정안전부 협의 및 국비 반영 요청

○ 2023.  3. 21. ~ 2024. 12. 4. : 기본 및 실시설계 용역 추진

○ 2023.  9.  5. : 주민설명회 개최(신창리사무소)

○ 2024.  2.  7. : 제주도 문화재위원회 기념물분과 심의 결과 통보

○ 2024.  3. 22. : 행정안전부 사전설계검토 심의 완료
○ 2024.  6. 27. : 공사 착공    * (준공예정) 2026. 6. 26.

○ 2024. 10. 24. : 건설사업관리용역 착수     * (완료예정) 2026. 10. 23.

4. 사업개요

○ 기  간: 2023. 1월 ~ 2027. 12월

○ 위  치: 제주시 한경면 신창리 945-1번지 일원

○ 사업량: 세천정비 700m, 우수관로정비 1,255m, 저류지 1개소

○ 총사업비: 13,060,000천원 (국 50%, 도 50%)

○ 공정률: 40%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		13,060	7,782	4,170	2,085	2,000	85	0	0	1,108
공사비	세천정비 정비 우수관로 정비 저류지 1개소	8,000	3,722	3,270	1,635	1,600	35	-	-	1,008
보상비	51필지	3,060	2,560	500	250	200	50	-	-	-
부대비	실시설계, 감리비 등	2,000	1,500	400	200	200	-	-	-	100

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		13,060	-	7,782	-	4,170	-	1,108
공사비	세천정비 정비 우수관로 정비 저류지 1개소	8,000	-	3,722	-	3,270	-	1,008
보상비	51필지	3,060	22필지	2,560	29필지	500	-	-
부대비	실시설계, 감리비 등	2,000	실시설계	800	감리비	400	-	100
			감리비	700

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	13,060	7,782	4,170	1,108
국 비	6,530	3,891	2,085	554
지 방 채	2,000	-	2,000	-
시 도 비	4,530	3,891	85	554

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 저류지 설치 및 배수시설 정비로 저지대 대규모 침수피해 사전 예방

30		우도1 자연재해위험개선지구 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 저류지 및 우수관로 등 방재시설 미비로 태풍 또는 집중호우 시 우수가 원활히 처리되지 못하여 오봉리 주택 및 농경지 침수피해가 발생함에 따라 정비사업 추진 필요

※ 사업시행 근거 :「자연재해대책법」제12조(자연재해위험개선지구의 지정 등)

2. 지방채 발행계획: 300백만원

3. 추진경위

○ 2021.  8. 25. : 자연재해위험개선지구 지정 고시

○ 2023.  3. 21. ~ 2024. 6. 14. : 기본 및 실시설계 용역 추진

○ 2023.  9. 12. : 주민설명회 개최(오봉리사무소)

○ 2024.  4. 12. : 제주도 사전설계검토 심의 완료

○ 2024.  5. 24. : 자연재해위험개선지구 지정(변경) 및 지형도면 고시

- (사유) 당초 저류지 및 우수관로를 통한 해양 방류 계획을 수립하였으나, 주민설명회 의견 등을 반영, 저류지 확장을 통한 자연침투 계획으로 변경함에 따른 지구 지정 면적 변경

○ 2024.  6. 26. ~ 2025. 6. 17.:  1차분 공사 추진

○ 2025.  6. 18. ~ : 2차분 공사 착공

4. 사업개요

○ 기  간: 2023. 1월 ~ 2026. 12월

○ 위  치: 제주시 우도면 연평리 1053-2번지 일원

○ 사업량: 저류지 1개소 (V=29,456㎥)

○ 총사업비: 7,630,000천 원(국 50%, 도 50%)

○ 공정률: 54%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		7,630	6,956	674	337	300	37	0	0	-
공사비	저류지 설치 등	3,630	2,956	674	337	300	37	-	-	-
보상비	14필지	3,600	3,600	-	-	-	-	-	-	-
부대비	설계비 등	400	400	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		7,630		6,956		674	-	-
공사비	저류지 설치 등	3,630	저류지 설치	2,956	저류지 설치	674	-	-
보상비	6필지	3,600	6필지	3,600	-	-	-	-
부대비	설계비 등	400	설계비 등	400	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,630	6,956	674	-
국 비	3,815	3,478	337	-
지 방 채	1,100	800	300	-
시 도 비	2,715	2,678	37	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 저류지 설치 및 배수시설 정비로 저지대 침수피해 해소

31		평대 자연재해위험개선지구 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 집중호우시 평대리 마을 상류부 위치한 침투형 저류지 월류로 범람한 유량이 마을 저지대로 유입, 주택 및 도로 침수 피해가 발생하여 재해저감대책 방안 마련 필요

2. 지방채 발행계획 : 2,000백만원

3. 추진경위

○ 2020. 4.∼12. 신규지정 타당성 용역

○ 2021. 8. 25.  자연재해위험개선지구 지정 및 고시

○ 2022. 2. 25.  건설기술심의(용역) 완료

○ 2022. 3.  7.  계약심사 완료

○ 2022. 5. 13.  기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2022. 6. 22.  실시설계 용역 추진계획 착수보고(제주시, 용역사, 평대리)

○ 2023. 4. 28.  행정안전부 사전설계검토 심의 완료

○ 2023. 5. 10.  계약심의(도 회계과) 완료

○ 2023. 7. 25.  건설기술심의(공사, 공기) 완료

○ 2023. 8. 17.∼23.  계약심사 및 일상감사 완료

○ 2023. 10. 27. : 공사 착공 (계약해지* 24.7.1.)

*사유: 체불, 채권가압류 등 공사 추진 불가)

○ 2023. 12. 22. : 건설사업관리용역 착수

○ 2024.  1. 26. : 사업인정(의제)사업 협의 완료(중앙토지수용위원회)

○ 2024.  7.  4. : 공사 재발주(조달청 계약 의뢰 ‘24. 8. 9.)

○ 2024. 12. 20. : 공사 착공    * (준공예정) 2026. 12. 20.

4. 사업개요

○ 기  간 : 2022~2026년(5개년)

○ 위  치 : 제주시 구좌읍 평대리 282-1번지 일원

○ 사업량: 저류지 2개소 확장, 우수관로정비(L=4.1km)

○ 총사업비: 1,630,000천원 (국 50%, 도 50%)

○ 공정률 : 21%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후 계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		16,300	11,324	4,090	2,045	2,000	45	0	0	886
공사비	공사1식	11,870	7,914	3,070	1,535	1,500	35	-	-	886
보상비	6필지	2,730	1,730	1,000	500	500	-	-	-	-
부대비	설계1식	1,700	1,680	20	10	-	10	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		16,300		11,324		4,090		886
공사비	저류지 2개소 확장	9,870	저류지확장	6,614	저류지확장	2,770	-	486
	우수관거정비 (L=4.1km)	1,500	L=4.1km	1,000	L=4.1km	200	-	300
	부대공 1식	500	부대공 1식	300	부대공 1식	100	-	100
보상비	토지보상 6필지	2,730	토지보상 3필지	1,730	토지보상 2필지	1,000	-	-
부대비	설계 1식	716	기본 및 실시설계	716	-	-	-	-
	건설사업관리 1식	984	건설사업관리 1식	964	시설부대비	20	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	16,300	11,324	4,090	886
국 비	8,150	5,662	2,045	443
지 방 채	3,300	1,300	2,000	-
시 도 비	4,850	4,362	45	443

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 저류지 설치 및 배수시설 정비로 저지대 대규모 침수피해 사전 예방

32		교래 자연재해위험개선지구 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 천미천 계획 홍수위보다 낮은 저지대로 하천수위 상승 시 교래리 지역으로 우수유출 집중 및 내수배제 불량으로 빈번히 발생하는 침수피해 예방

※ 사업시행 근거 :「자연재해대책법」제12조(자연재해위험개선지구의 지정 등)

2. 지방채 발행계획: 100백만원

3. 추진경위

○ 2023.  4. 12. : 자연재해위험개선지구 지정 고시

○ 2024.  4. 25. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2024.  6. 25. : 사업지구 간 사업비 변경 승인(행정안전부)

- (사유/내용) 연내 미집행액 조정/교래지구(감 4억원), 우도1지구(증 4억원)

○ 2024.  9. 24. : 침수피해 저감방안 관련 마을관계자 협의

○ 2024. 10. 21. : 주민설명회 개최(교래리사무소)

○ 2024. 12. 18. : 행정안전부 기본설계 사전협의

○ 2025.  4. 16. : 기본 및 실시설계용역 일시 정지

- (사유) 저류지 대상지에 상수도 공급시설 인접함에 따라 관계기관 협의 지연

4. 사업개요

○ 기  간: 2024. 1월 ~ 2027. 12월

○ 위  치: 제주시 조천읍 교래리 589번지 일원

○ 사업량: 펌프장(274㎥/min) 설치, 저류지(10,000㎥) 설치 및 관로 정비(1.87km)

○ 총사업비: 17,566,000천 원(국 50%, 도 50%)

○ 공정률: 설계중

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		17,566	2,300	200	100	100	-	-	-	15,066
공사비	저류지, 배수관로, 펌프장 등	14,666	-	-	-	-	-	-	-	14,666
보상비	10필지	600	-	200	100	100	-	-	-	400
부대비	설계용역 등	2,300	2,300	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		17,566	-	2,300	-	200	-	15,066
공사비	저류지, 배수관로, 펌프장 등	14,666	-	-	-	-	저류지, 배수관로, 펌프장 등	14,666
보상비	10필지	600	-	-	3필지	200	7필지	400
부대비	설계용역 등	2,300	-	2,300	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	17,566	2,300	200	15,066
국 비	8,783	1,150	100	7,533
지 방 채	100		100	-
시 도 비	8,683	1,150	-	7,533

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 저류지 설치로 홍수량 저감 및 천미천 방류로 저지대 침수피해 해소

33		한천 자연재해위험개선지구 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 현재 복개구간 하부지지 구조물(기둥)으로 인한 통수단면 부족 등 하천범람 피해예방 및 주민의 안전과 재산보호

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 2019.  9월 : 한천 자연재해위험개선지구 지정 고시

○ 2020.  5월 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021.  3월 ~ 8월 : 주민설명회 개최(1·2·3회)

○ 2022.  2월 :	관급자재(한천교,제2한천교,용연교,보도교 2개소) 공법선정위원회 개최 및 선정

○ 2022. 10월 : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2022. 11월 : 공사 착공(전체분, 1차분)

○ 2023.  3월 ~ 8월 : 주민설명회 개최(4·5회)

○ 2023. 10월 ~ 12월 : 사업 추진위원회 구성 및 개최(1·2회)

○ 2024.  1월 : 관급자재(용연교 가설교량) 공법선정위원회 개최 및 선정

○ 2024.  2월 : 행안부 사전설계(변경) 검토 요청(공법 변경)

○ 2024.  4월 : 행안부 사전설계검토 결과 통보(조건부 승인)

⇒ 공법 변경에 따른 공사비, 감리비 등 5,041백만원 증액

(낙찰차액 3,709백만원, 총사업비 1,332백만원 증액)

○ 2024.  5.  3. : 사업 추진위원회 개최(3회)

○ 2024.  8.  8. : 사업 추진위원회 개최(4회)

○ 2024.  9. 20. : 도 사사업계획 변경 승인 통보

⇒ 한천교 존치, 친환경 철거공법 변경에 따른 공사비, 감리비 등 총사업비 3,557백만원 증액

○ 2024. 10. 17. : 사업 추진위원회 개최(5회)

○ 2024. 12. 16. : 공사 착공(2차분) 및 준공(1차분)

○ 2025.  2. 21. : 공사 착공(3차분)

○ 2025.  8. 27. : 사업 추진위원회 개최(6회)

4. 사업개요

○ 기  간: 2020~2028년(9개년)

○ 위  치: 제주시 용담일동 2581-4번지 일원

○ 내  역: 복개 철거(A=17,800㎡), 캔틸레버구조물 설치(L=622m), 교량 재가설(2개소) 등

○ 공정율: 26%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		42,889	30,248	4,152	4,066	2,000	76	0	0	8,489
공사비	공사 1식	38,892	26,251	4,152	2,076	2,000	76-	-	-	8,489
감리비	용역 1식	2,659	2,659	-	-	-	-	-	-	-
부대비	설계 1식	1,338	1,338	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		42,889		30,248		4,152		8,489
공사비	흙막이 가시설 1식	6,230	흙막이 가시설 1식	4,138	흙막이 가시설 1식	1,000	흙막이 가시설 1식	1,092
	철거 1식 (복개, 교량)	7,132	철거 1식 (복개, 교량)	5,832	철거 1식 (복개, 교량)	1,000	철거 1식 (복개, 교량)	300
	캔틸레버 구조물 설치 (L=622m)	18,958	캔틸레버 구조물 설치 (L=622m)	15,281	캔틸레버 구조물 설치 (L=622m)	2,000	캔틸레버 구조물 설치 (L=622m)	1,677
	교량 재가설 (2개소)	4,000	교량 재가설 (2개소)	-	교량 재가설 (2개소)	100	교량 재가설 (2개소)	3,900
	부대공 1식	2,572	부대공 1식	1,000	부대공 1식	52	부대공 1식	1,520
감리비		2,659		2,659
부대비		1,338		1,338

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	42,889	30,248	4,152	8,489
국 비	21,444.5	15,124	2,076	4,244.5
지 방 채	6,244.5	-	2,000	4,244.5
시 도 비	15,200	15,124	76	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 하천 범람으로 인한 피해를 예방하여 지역 주민의 안전과 재산보호

34		수산천 지방하천 정비사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 하천기본계획에 따른 체계적인 하천정비를 통하여 태풍 등 기상이변에 따른 집중호우 시 호안 유실 및 하천범람으로 인한 인적․물적 피해 사전 예방

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 2024. 7월 ~ 10월 : 주민설명회 개최(1~2차)

○ 2024. 11. 29. : 실시설계용역 완료(2024. 02. 29. 착수)

○ 행정절차 이행(절대보전지역 행위허가, 농지전용, 일상감사, 계약심사)

○ 2025. 02. 27. : 사업인정(의제) 중앙토지수용위원회 협의 완료

○ 2025. 03. 17. : 편입토지 등 보상비 책정 및 통보 * 보상협의율 80%(12필지/15필지)

○ 2025. 04. 03. : 하천공사 시행계획 수립 및 고시

○ 2025. 04. 18. : 설계안전성 검토 용역 완료(2025. 2. 18. 착수)

4. 사업개요

○ 기  간: 2024. 1월 ~ 2027. 6월

○ 위  치: 제주시 애월읍 구엄리 355 ~ 412 일원(수산천 일대)

○ 내  역: 호안정비 L=346m,
교량 재가설 2개소[구엄1세월교(B=6m, L=39m), 구엄새마을2교(B=7m, L=28m)]

○ 공정률: 13.8%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		4,000	2,000	2,000	-	2,000	-	-	-	-
공사비	하천정비 346m, 교량 재가설 2개소	2,511	652	1,859	-	1,859	-	-	-	-
부대비	부대 1식	142	137	5	-	5	-	-	-	-
토지 보상비	보상 15필지	1,347	1,211	136	-	136	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		4,000		2,000		2,000		-
공사비	하천정비 346m, 교량 재가설 2개소	2,511	교량 재가설 1개소	652	하천정비 346m, 교량 재가설 1개소	1,859	-	-
부대비	부대 1식	142	부대 1식	137	부대 1식	5	-	-
토지 보상비	보상 15필지	1,347	보상 12필지	1,211	보상 3필지	136	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,000	2,000	2,000	-
국 비	-	-	-	-
지 방 채	2,000	-	2,000	-
시 도 비	2,000	2,000	-	-	균특이양

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 하천정비 사업을 통하여 하천 범람 및 침수 우려 지역에 대한 사전 재해예방과 하천의 기능 회복

35		삼수천 지방하천 정비사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 하천기본계획에 따른 체계적인 하천 정비를 통하여 태풍 내습과 집중호우 시 호안 유실 및 하천 범람으로 인한 인적․물적 피해 사전 예방

2. 지방채 발행계획: 2,500백만원

3. 추진경위

○ 2024. 6월 ~ 12월 : 주민설명회 개최(1~3차)

○ 2024. 06. 19. : 편입토지 등 보상비 책정 및 통보 * 보상협의율 73%(24필지/33필지)

○ 2024. 12. 09. : 실시설계용역 완료(2024. 3. 5. 착수)

○ 2024. 12. 12. : 소규모환경영향평가 용역 완료(2024. 5. 17. 착수)

○ 행정절차 이행(절대보전지역 행위허가, 농지전용, 일상감사, 계약심사)

○ 2025. 01. 24. : 보상계획 열람 및 사업인정에 대한 의견청취 공고

○ 2025. 02. 27. : 사업인정(의제) 중앙토지수용위원회 협의 완료

○ 2025. 03. 14. : 하천공사 시행계획 수립 및 고시

○ 2025. 04. 17. : 전체분 및 1차분 착공

○ 2025. 05. 21. : 폐기물처리용역(전체분 및 1차분) 착공

4. 사업개요

○ 기  간: 2024. 1월 ~ 2027. 4월

○ 위  치: [1구간] 제주시 화북이동 140-8 ~ 도련일동 2740
[2구간] 제주시 도련일동 2329-2

○ 내  역: 호안정비 L=1,363m,
교량 재가설 1개소[삼수천제2교(B=9.5m, L=27m)]

○ 공정률: 14.5%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		9,000	6,500	2,500	-	2,500	-	-	-	-
공사비	하천정비 1,363m, 교량 재가설 1개소	3,731	1,750	1,981	-	1,981	-	-	-	-
부대비	부대 1식	714	714	-	-	-	-	-	-	-
토지 보상비	보상 33필지	4,555	4,036	519	-	519	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		9,000		6,500		2,500		-
공사비	하천정비 1,363m, 교량 재가설 1개소	3,731	하천정비 377m, 교량 재가설 1개소	1,750	하천정비 986m,	1,981	-	-
부대비	부대 1식	714	부대 1식	714	부대 1식	-	-	-
토지 보상비	보상 33필지	4,555	보상 24필지	4,036	보상 11필지	519	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,000	6,500	2,500	-
국 비	-	-	-	-
지 방 채	2,500	-	2,500	-
시 도 비	6,500	6,500	-	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 하천정비 사업을 통하여 하천 범람 및 침수 우려 지역에 대한 사전 재해예방과 하천의 기능 회복

36		동신술굴내 소하천 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 소하천정비종합계획에 따라 자연친화적인 하천 정비로 주변 농경지, 주택 침수를 사전 예방하고 주민불편 해소 및 재산보호

2. 지방채 발행계획: 2,500백만원

3. 추진경위

○ 2024. 9월 : 동신술굴내 실시설계용역 착수

○ 2025. 3월 : 재해□환경영향평가 용역 착수

○ 2025. 7월 : 주민설명회 개최 및 검토 결과 보고

4. 사업개요

○ 기  간: 2025.1 ~ 2028. 12.

○ 위  치: 제주시 구좌읍 송당리 1891-3번지 일원

○ 내  역: 하천정비 L=2.3km, 교량 3개소 등

○ 공정률: 실시설계 용역 진행중

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		8,000	1,000	2,500		2,500				4,500
공사비	공사 1식	7,000		2,500		2,500				4,500
감리비	용역 1식
부대비	설계 1식	1,000	1,000

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		8,000		1,000		2,500		4,500
공사비	하천정비 L=2.3km	7,000			토지보상비 1식	2,500	하천정비 L=2.3km	4,500
감리비
부대비	부대공 1식	1,000	부대공 1식	1,000

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	8,000	1,000	2,500	4,500
국 비	-	-	-	-
지 방 채	2,500	-	2,500	-
시 도 비	5,500	1,000	-	4,500

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 소하천 범람으로 인한 피해를 예방하여 인근 주민의 안전과 재산 보호

37		(가칭)광양경로당 및 청소년시설 신축

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주시 이도1동 관내 경로당 부족 및 청소년시설(방과 후 아카데미) 공간협소로 시설확보 필요

2. 지방채 발행계획: 2,900백만원

3. 추진경위

○ 2024년 제6회 공유재산심의회 심의 가결: ‘24. 9. 5.

○ 2024년 수시 지방재정투자사업 심사 조건부 적정: ‘24. 10. 23.

○ 경로당 및 청소년시설 신축부지 경계복원측량: ‘25. 1. 13.

○ 경로당 및 청소년시설 신축부지 지형현황측량: ‘25. 1. 15. ~ 1. 22.

○ 경로당 및 청소년시설 신축기획설계용역: ‘25. 3. 26. ~ 6. 23.

○ 신축부지 회계간 재산이관 완료(도 교육청→시 노인복지과): ‘25. 5. 9.

○ 경로당 및 청소년시설 신축사업 사전검토(도 건축경관과): ‘25. 5. 20. ~ 6. 18.

○ 경로당 및 청소년시설 신축부지 지반조사: ‘25. 6. 5. ~ 6. 24.

○ 경로당 및 청소년시설 신축 공공건축심의재심의(2차) : ‘25. 7. 8. ~ 7. 28.

○ 경로당 및 청소년시설 신축사업 설계공모의뢰(도 건축경관과): ‘25. 8. 12.

○ 경로당 및 청소년시설 신축사업 공모안 접수: ‘25. 9. 10.~ 10. 10.

○ 경로당 및 청소년시설 신축사업 설계공모안 작품심사(예정): ‘25. 10. 20.

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. 1.~ 2026. 12. 31.

○ 위  치: 제주시 이도1동 1650-7외 4필지

○ 내  역: 노유자시설 지상 4층, 연면적 800㎡ (대지면적 1,057㎡)

※ 제주시 이도1동 1664-7(참사랑문화의 집)과 신축 후 합병 예정

○ 공정률: 실시설계용역 공모 중(’25.2. 설계완료 예정)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		4,964	194	4,770		2,900	1,870
공사비	1식	3,939		3,939		2,900	1,039
감리비	1식	35		35			35
부대비	실시설계용역포함	990	194	796			796

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		4,964		194		4,770
공사비	공사1식	3,939			공사1식	3,939
감리비	감리1식	35			감리1식	35
부대비	실시설계용역 등	990	실시설계 용역포함	194	제반비용 등	796

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,964	194	4,770
국 비
지 방 채	2,900		2,900
시 도 비	2,064	194	1,870

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 어르신들의 여가·소통 공간 확보로 고립감 해소 및 지역주민간 교류와 세대 간 소통의 장으로 활용되어 공동체 의식 강화

○ 청소년시설 확충으로 다양한 프로그램 운영이 가능하고 지역 내 돌봄 기능 강화

38		제주시민회관 생활SOC복합화사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 제주시민회관을 문화·체육·복지 등 복합 커뮤니티 공간과 새로운 랜드마크로 조성하여 시민 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화

2. 지방채 발행계획: 4,500백만원

3. 추진경위

○ (‘18. 12. 15.) 시민회관 활용방안 타당성 조사 및 기본설계 용역 완료

○ (‘20. 04. 29.) 공유재산관리계획 가결

○ (‘20. 09. 23.) 2021년 생활SOC복합화 사업 선정

○ (‘20. 12. 16.) 제주 시민회관 복합화사업 공간구성 방안 연구용역 완료

○ (‘21. 05. 12.) 국토교통부 공공건축계획 사전검토

○ (‘21. 07. 12.) 공공건축계획 심의 조건부 의결(도 공공건축심의위원회)

○ (‘21. 08. 02.) 건축 설계공모 공고

○ (‘21. 12. 24.) 기본 및 실시설계용역 착수

○ (‘22. 10. 17.) 기본 및 실시설계용역 완료

○ (‘22. 10. 27.) 지방재정 투자사업 중앙심사 의결(조건부)

○ (‘23. 03. 22.) 공용건축물(신축) 협의 완료

○ (‘23. 04. 07.) 공사 착공

○ (‘23. 04. 07.) 감독권한대행 건설사업관리용역 착수

○ (‘23. 08. 18.) 기존 시민회관 해체 완료

○ (‘24. 11. 12.) 지하층 골조공사 완료

○ (‘25. 5월 ~ 현재) 골조공사 추진 중(공정률59.6%)

4. 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1월 ~ 2026. 10월(5개년)

○ 위  치 : 제주시 이도일동 1700-1번지 일원

○ 내  역 : 생활SOC복합화시설 건립 1식

- 사업규모: 대지면적 3,148.7㎡, 연면적 11,042㎡, 지하2층/지상6층

- 주요시설: 공공도서관, 국민체육센터, 가족센터, 건강생활지원센터 등

○ 공정율 : 59.6%(‘25.9월 말 기준)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	-	42,000	37,427	4,573	-	4,500	73	-	-	-
시설비	생활SOC 복합화시설 건립 1식	39,000	34,427	4,573	-	4,500	73	-	-	-
감리비	감독권한 대행 감리 용역 등	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                      (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	-	42,000	-	37,427	-	4,573	-	-
시설비	생활SOC 복합화시설 건립 1식	39,000	공공도서관	12,560	공공도서관	-	-	-
			소규모공연장	4,930	소규모공연장	70
			국민체육센터	5,548	국민체육센터	272
			가족센터	2,966	가족센터	1,500
			건강생활지원센터	1,819	건강생활지원센터	1,731
			주거지주차장	6,604	주거지주차장	1,000
감리비	감독권한대행 감리 용역 등	3,000	공공도서관	1,940	공공도서관	-	-	-
			국민체육센터	280	국민체육센터	-
			가족센터	384	가족센터	-
			주거지주차장	396	주거지주차장	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	42,000	37,427	4,573	-	-
국 비	6,814	6,814	-	-	-
지 방 채	4,500	-	4,500	-	-
시 도 비	30,686	30,683	73	-	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 생활SOC복합화시설 건립으로 원도심 활성화 및 시민 문화향유 기회 확대

39		이호게이트볼장 토지매입

1. 사업목적 또는 필요성

○ 2022년 국유지 무단점유에 따라 변상금이 부과되었던 이호게이트볼장 국유지를 매입하여 지역주민들이 원하는 실내체육관 건립 추진

2. 지방채 발행계획: 3,500백만원

3. 추진경위

○ 2002: 소음피해지역주민 건의에 따라 이호게이트볼장 최초 조성

○ 2011: 2011년 국유재산법 개정에 따라 지방자치단체 국유지 무상사용 불가

○ 2002 ~ 2013: 국유지 무상사용 허가 ※ 2013. 12. 31. 무상 사용허가 종료

⇒ 2014. 1. 1. ~ 2022. 12. 11.까지 무단점유

○ ’22. 11월: 변상금 사전통지(제주지방항공청 → 이호동)

○ ’22. 12월: (이호동) 변상금 납부(134,265,390원) ※ 부과기간: '17.12.12.~'22.12.11.(5년)

○ ’24.  7월: (이호동) 국유지 매입 및 실내 다목적체육관 건립 요청

* ’21~’24년 시장님 이호동 방문 시, 주민들이 매년 지속적으로 건의한 사항

○ ’24.  9월: (지방재정투자심사) 조건부 승인(중기지방재정계획 반영 시)

○ ’24. 10월: (공유재산심의회) '24년 제7차 공유재산심의회 심의 원안 가결

○ ’24. 12월: (공유재산관리계획) 제434회 도의회 제1차 본회의 원안 가결

- 이호게이트볼장 토지 매입(4,223백만원) 및 실내 다목적체육관 건립(4,700백만원)

○ ’25. 본예산, 1회 추경: 토지매입비 4,223백만원 예산 미반영

○ ’26. 본예산: 토지매입비 4,223백만원 예산 재요구

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.

○ 위  치: 이호이동 861-3, 861-6

○ 내  역: 토지 2필지(3,435㎡) 매입 및 실내체육관(935㎡) 건립

- 이호이동 861-3(1,108㎡) 토지매입비 1,600백만원(도비 1,600)

- 이호이동 861-6(2,327㎡) 토지매입비 2,623백만원(지방채 2,400, 도비 223)

- 실내체육관(935㎡) 건립비 4,700백만원(국비 4,000, 도비 700)

실내체육관 935㎡: 다목적체육관(1)(510㎡), 헬스장(100㎡), GX룸(75㎡), 유아활동공간(80㎡), 기타공간(2)(170㎡)

(1) 다목적체육관: 농구 한코트 (프리존포함 30m×17m) 내 배구코트 포함 조성

(2) 기타공간: 공용홀(40㎡), 사무실(30㎡), 창고(30㎡), 화장실(40㎡), 기계실(30㎡)

○ 공정률: 0%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		8,923	-	4,223	-	3,500	723	-	-	4,700
공사비	935㎡	4,365	-	-	-	-	-	-	-	4,365
용역비	설계, 감리 등	335	-	-	-	-	-	-	-	335
토지매입비	3,435㎡	4,223	-	4,223	-	3,500	723	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		8,923	-	-	3,435㎡	4,223	1,835㎡	4,700
공사비	건축공사	3,211	-	-	-	-	935㎡	3,211
	토목조경	56	-	-	-	-		56
	전기공사	287	-	-	-	-		287
	통신공사	31	-	-	-	-		31
	소방공사	248	-	-	-	-		248
	주차장조성	120	-	-	-	-	900㎡	120
	부대비	15	-	-	-	-	-	15
	예비비	397	-	-	-	-	-	397
용역비	설계1식	176	-	-	-	-	기획,설계공모	176
	감리1식	67	-	-	-	-	건축,전기,소방	67
	기타용역1식	92	-	-	-	-	BF인증, 지반조사 등	92
토지매입비	3,435㎡	4,223	-	-	3,435㎡	4,223	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	8,923	-	4,223	4,700
국 비	4,000	-	-	4,000
지 방 채	3,500	-	3,500	-
시 도 비	1,423	-	723	700

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 항공기 소음피해지역인 이호동 지역 주민들을 위해 국유지를 매입 후 다목적

실내체육관을 건립하여 지역 주민들의 건강 및 삶의 질 향상

40		서부지역 파크골프장 조성사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 파크골프 수요 증가 대비 서부(애월)지역에 공인 규격의 파크골프장을 조성하여 파크골프 인프라 저변 확대 및 각종 대회 개최

2. 지방채 발행계획: 3,000백만원

3. 추진경위

○ ’23. 09.: 공유재산심의회 심의 (가결)

○ ’23. 11.: 소규모재해영향평가 협의 (재해영향평가 협의 대상 아님)

○ ’24. 06.: 소규모환경영향평가 협의 (완료)

○ ’24. 10.: 공유재산심의회 재심의* (가결)

*재심의 사유: 사업비 변경 (빗물이용시설 설치에 따른 사업비 증가)

○ ’24. 12.: 기본 및 실시설계용역, 편의시설 실시설계용역 (완료)ㄴ

○ ’25. 03.: 지방재정투자심사 (이행)

○ ’25. 03. ~ 06.: 파크골프장 편의시설 BF예비인증용역 (완료)

○ ’25. 08.: 중기지방재정계획 수립 (요구)

○ ’25. 09. ~ 10.: 일상감사 (완료), 계약심사 (추진중)

4. 사업개요

○ 기  간: 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 위  치: 제주시 애월읍 상가리 산113번지 외 1필지

○ 내  역: 파크골프장 27홀 조성 1식, 휴게시설(관리실, 공중화장실) 조성 1식, 주차장 조성 1식, 이용편의시설(이동식화장실 등) 설치 1식

○ 공정률: 0%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		5,650	1,650	3,000	0	3,000	0	0	0	1,000
공사비	· 파크골프장 27홀 조성 1식 · 휴게시설 조성 1식 · 주차장 조성 1식 · 이용편의시설 설치 1식	5,450	1,450	3,000	0	3,000	0	0	0	1,000
부대비	· 각종 용역 1식 · 전용비 1식	200	200	0	0	0	0	0	0	0

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		5,650		1,650		3,000		1,000
공사비	토목 1식 건축 1식 전기 1식 통신 1식	2,970 2,200 180 100	토목 1식 건축 1식 전기 1식 통신 1식	1,170 0 180 100	토목 1식 건축 1식 전기 1식 통신 1식	1,800 1,200 0 0	건축 1식	1,000
부대비	각종 용역 1식 전 용 비	150 50	각종 용역 1식 전 용 비	150 50	-	0	-	0

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	5,650	1,650	3,000	0
국 비	1,500	1,500	0	0
지 방 채	4,000	0	3,000	0
시 도 비	150	150	0	0

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 공인 파크골프장 조성으로 파크골프 수요에 대응하고 각종 대회 개최로 지역 경제 활성화

41		사용종료 폐기물 처리시설 철거 및 정비

1. 사업목적 또는 필요성

○ 봉개동 폐기물 처리리설 운영 종료 및 주민 협약에 따라 사용종료된 폐기물 처리시설 해체공사 추진

○ 노후 및 향후 사용계획이 없는 시설물 철거로 안전위해요소 제거 및 시설유지비용 절감

2. 지방채 발행계획: 2,700백만원

3. 추진경위

○ ‘19. 10. 봉개매립장 매립종료

○ ’23. 09. 봉개매립장 최종복토공사 준공

○ ‘23. 12. 봉개매립장 사용종료 신고 수리

○ ‘24. 06. 음식물 쓰레기 시설 운영종료

○ '25. 03. 사용종료 폐기물처리시설 해체공사 실시설계용역 발주

○ '25. 04. 사용종료 폐기물처리시설 해체공사 기관석면조사

○ '25. 06. 실시설계용역 완료

○ '25. 08. 중기공유재산관리계획안 제출

○ '25. 09. 지방재정투자심사 및 공유재산심의회 의결

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 01 ~ 2026. 12.

○ 위  치: 제주시 회천동 294-22번지 일원

○ 내  역: 사용종료 폐기물처리시설 철거

○ 공정률: 0%(착공 전)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
폐기물처리시설 철거	건축물 12동(부속16동) 기계설비 219종 철거	4,630	130	4,500	-	2,700	1,800	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		4,630		130		4,500
처리 시설 철거	사용종료 폐기물처리 시설 철거	4,630	해체공사 실시설계용역	90	폐기물 처리시설 철거 (건축물 12동, 부속 16동, 기계설비 219종 철거)	4,500
			노후 세차시설 철거	40

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,630	130	4,500	-
국 비	-	-	-	-
지 방 채	2,700	-	2,700	-
시 도 비	1,930	130	1,800	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 지역주민과의 협약 이행을 통한 행정 신뢰 제고 및 친환경적인 봉개매립장 사후 활용기반 마련

42		농업용수 저수시설 정비사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 가뭄, 농번기 시 농업용수 부족 문제로 인해 농업생산 활동에 저해 요인이 되고 있어 농업용수 저류시설을 정비하여 안정적인 공급체계를 유지하기 위함

※ 사업시행 근거 : 「농어촌정비법」제18조

2. 지방채 발행계획: 3,000백만원

3. 추진경위

○ ‘24. 7. ~ ‘25. 6. : 10개지구 저수조 증설 요청

- 한경면(조수1리, 고산2리), 애월읍(납읍리, 하가리, 상가리, 장전리, 어음2리)
조천읍(대흘1리), 구좌읍(행원리, 동복리)

○ ‘25. 6. : ‘26년 농업용 저수지 정비사업 세부설계용역 발주(‘25. 12.완료예정)

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. ~ 12.

○ 위  치: 제주시 일원

○ 내  역: 소규모 저수조 용량 증설 10개소

○ 사업지: 한경면(조수1리, 고산2리), 애월읍(납읍리, 하가리, 상가리, 장전리, 어음2리), 조천읍(대흘1리), 구좌읍(행원리, 동복리)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
공사비	저수조 증설 20개소	10,000		5,000		3,000	2,000			5,000

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
공사비	저수조 증설 20개소	10,000			저수조 증설 10개소	5,000	저수조 증설 10개소	5,000

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	10,000	-	5,000	5,000
지 방 채	3,000	-	3,000	-
시 도 비	7,000	-	2,000	5,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 농가의 수요가 급증하는 경작 시기나 가뭄 발생 시 기존 저수지 용량이 부족하여 원활한 농업용수 공급이 어려운 실정으로 저수지 용량 확충을 통한 용수 저장 능력 향상과 가뭄시 안정적인 농업용수 공급 및 이용 극대화로 농가소득 향상 기여

43		소규모 배수개선사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 50ha미만 침수피해 발생 농경지를 대상으로 배수시설을 확충하여 농작물 침수방지 및 재해 사전예방에 따른 안정적 영농활동 도모

2. 지방채 발행계획: 2,500백만원

3. 추진경위

○ ‘25. 5. : 25개지구 소규모 배수개선사업 요청

- 구좌읍(송당리, 동복리, 종달리, 한동리, 김녕리, 하도리), 애월읍(광령리, 수산리, 어음리), 조천읍(선흘리, 함덕리, 와산리, 와흘리), 한림읍(귀덕리, 상대리, 월림리, 명월리, 금악리, 상명리), 한경면(금등리, 용수리, 낙천리, 저지리, 청수리, 고산리)

○ ‘25. 8. : ‘26년 동·서부지역 소규모배수개선사업 기본 및 세부설계용역 발주(‘25. 12.완료예정)

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. ~ 12.

○ 위  치: 제주시 일원

○ 내  역: 소규모 배수개선사업 25개지구

○ 사업지: 구좌읍(송당리, 동복리, 종달리, 한동리, 김녕리, 하도리), 애월읍(광령리, 수산리, 어음리), 조천읍(선흘리, 함덕리, 와산리, 와흘리), 한림읍(귀덕리, 상대리, 월림리, 명월리, 금악리, 상명리),한경면(금등리, 용수리, 낙천리, 저지리, 청수리, 고산리)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		32,400	24,900	2,500		2,500	0			5,000
공사비	소규모배수개선사업 25개지구	32,354	24,884	2,490		2,490				4,980
부대비	기술지도 1식	46	16	10		10				20

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		32,400		24,900		2,500		5,000
공사비	소규모배수개선사업 25개지구	32,354	소규모배수개선사업	24,884	소규모배수개선사업 25개지구	2,490	소규모배수개선사업	4,980
부대비	기술지도 1식	46	기술지도 1식	16	기술지도 1식	10	기술지도 1식	20

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	32,400	-	2,500	5,000
지 방 채	2,500	-	2,500	-
시 도 비	29,900	24,900		5,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 50ha미만 침수피해 발생 농경지 대상 배수시설을 확충을 통하여 농작물 침수방지 및 재해 사전예방으로 농작물 보호와 농민의 안정적 영농활동 향상

44		농촌생활환경정비사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 상대적으로 낙후된 ‘면’단위 지역 내 기초생활 기반시설, 문화·복지시설 등을 종합적으로 정비하여 농촌주민의 삶의 질 향상 및 지역 균형발전을 도모

2. 지방채 발행계획: 2,400백만원

3. 추진경위

○ ‘22. 1. ~ ‘22. 12. : 19개지구, 2,500백만원(3개지구, 200백만원)

- 재배정 : 한경면 15개지구 2,200백만원, 우도면 1개지구 100백만원

○ ‘23. 1. ~‘23. 12. : 17개지구, 2,500백만원(7개지구, 1,420백만원)

- 재배정 : 한경면 10개지구 1,080백만원

○ ‘24. 1. ~ ‘24. 12. : 11개지구, 3,000백만원(6개지구, 1,500백만원)

- 재배정 : 한경면 5개지구 1,500백만원

○ ‘25. 1. ~ ‘25. 12. : 19개지구, 3,500백만원(5개지구, 1,550백만원)

- 재배정 : 한경면 7개지구 1,000백만원, 추자면 4개지구 600백만원, 우도면 3개지구 350백만원

○ ‘25. 6. : ‘26년 농촌 생활환경 정비사업 대상지 선정

- 한경면(조수, 고산, 낙천, 두모)

○ ‘25. 6. : ‘26년 농촌 생활환경 정비사업 세부실시용역(‘25.12.완료예정)

4. 사업개요

○ 기  간 : 2026. 1. ~ 12.

○ 위  치 : 제주시 일원

○ 내  역 : 농촌지역 내 기반시설 정비 및 신설 15개 지구

○ 사업지 : 한경면(조수리, 고산리, 낙천리, 두모리)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2025년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		22,700	15,600	3,000		2,400	600			4,100
시설비	농촌생활정비 74개지구	22,682	15,590	2,996		2,400	596			4,096
시설부대비	기술지도 1식	18	10	4			4			4

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		22,700	-	15,600		3,000		4,100
시설비	농촌생활정비 74개지구	22,682	농촌생활정비 42개지구	15,590	농촌생활정비 15개지구	2,996	농촌생활정비 17개지구	4,096
시설부대비	기술지도 1식	18	기술지도 1식	10	기술지도 1식	4	기술지도 1식	4

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획
계	22,700	15,600	3,000	4,100
지 방 채	2,400	-	2,400	-
시 도 비	20,300	15,600	600	4,100

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 상대적으로 낙후된 ‘면’단위 지역 내 기초생활 기반시설 등을 종합적으로 정비하여 주민의 생활편의와 정주여건을 개선하고 농촌지역에 활력 증진과 지속가능한 발전을 기대

45		농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 노후된 농업용 수리시설 보수를 통한 원활한 농업용수 공급으로 영농소득증대에 기여

○ 고장민원(전기, 모터펌프, 자동제어, 관로 등)신속 처리로 영농 불편사항 해소

※ 사업시행 근거 : 「농어촌정비법」 제18조

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ ‘22. 1. ~ ‘22. 12. : 11개지구, 3,000백만원

○ ‘23. 1. ~ ‘23. 12. : 9개지구, 3,500백만원

○ ‘24. 1. ~ ‘24. 12. : 15개지구, 4,000백만원

○ ‘25. 1. ~ ‘25. 12. : 13개지구, 4,500백만원

○ ‘24. 7. ~ ‘25. 6. : ‘26년 농업용 수리시설 개보수사업 대상지 선정(13개지구)

- 한림읍(월령, 명월, 상대, 귀덕, 수원), 애월읍(하귀1, 하가, 동명, 애월, 봉성)
동지역 (도련1, 봉개, 외도)

○ ‘25. 6. : ‘26년 농업용 수리시설 개보수사업 세부설계용역 발주(‘25.12.완료예정)

4. 사업개요

○ 기    간: 2026. 1. ~ 12.

○ 위    치: 제주시 일원

○ 내    역: 농업용 수리시설 개보수 13개 지구

○ 사 업 지: 한림읍(월령, 명월, 상대, 귀덕, 수원), 애월읍(하귀1, 하가, 동명, 애월, 봉성)
동지역 (도련1, 봉개, 외도)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		19,500	12,500	2,000		2,000	0			5,000
공사비	개보수 81개지구	19,471	12,476	2,000		2,000	-			4,995
부대비	기술지도 1식	29	24	-		-	-			5

< 연도별·공종별 투자계획 >                                      (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		19,500		12,500		2,000		5,000
공사비	개보수 81개지구	19,471	개보수 54개지구	12,476	개보수 13개지구	2,000	개보수 14개지구	4,995
부대비	기술지도 1식	29	기술지도 1식	24	기술지도 1식	-	기술지도 1식	5

< 연도별·재원별 투자계획 >                                      (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	19,500	12,500	2,000	5,000
지 방 채	7,000	-	2,000	5,000
시 도 비	12,500	12,500		-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 노후된 농업용 수리시설 개보수를 통한 이상기후 대응 등 농업용수 공급 차질 해소로 영농활동의 효율성 향상, 주민들의 불편 해소와 농업 생산성 증대 기대

46		농업용수 관로 정비사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 노후화 된 농업용수 관로를 정비하여 누수를 사전에 방지하고 원활한 농업용수 공급으로 안정적인 영농활동 도모

※ 사업시행 근거 : 농어촌정비법 제18조

2. 지방채 발행계획: 3,000백만원

3. 추진경위

○ ‘22. 1. ~ ‘22. 12. : 13개지구, 1,800백만원

○ ‘23. 1. ~ ‘23. 12. : 14개지구, 2,500백만원

○ ‘24. 1. ~ ‘24. 12. : 18개지구, 3,500백만원

○ ‘25. 1. ~ ‘25. 12. : 12개지구, 4,000백만원

○ ‘24. 7. ~ ‘25. 6. : ‘26년 농업용수 관로 정비 사업대상지 선정(14개지구)

- 구좌읍(행원, 평대, 월정, 김녕), 조천읍(대흘1, 조천, 대흘2, 함덕)
애월읍(장전, 고성1), 한경면(한원), 동지역(이호, 광이2, 월평)

○ ‘25. 6. : ‘26년 농업용수 관로 정비사업 세부설계용역 발주(‘25.12.완료예정)

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. ~ 12.

○ 위  치: 제주시 일원

○ 내  역: 농업용수 관로 정비 14개지구

○ 사 업 지: 구좌읍(행원, 평대, 월정, 김녕), 조천읍(대흘1, 조천, 대흘2, 함덕)
애월읍(장전, 고성1), 한경면(한원), 동지역(이호, 광이2, 월평)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		22,725	13,725	4,000		3,000	1,000			5,000
공사비	관로정비 91개지구	22,705	13,715	3,995	-	2995	1,000	-		4,995
부대비	기술지도 1식	20	10	5	-	5		-		5

< 연도별·공종별 투자계획 >                                      (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		22,725		13,725		4,000		5,000
공사비	관로정비 91개지구	22,705	관로정비 62개지구	13,715	관로정비 14개지구	3,995	관로정비 15개지구	4,995
부대비	기술지도 1식	20	기술지도 1식	10	기술지도 1식	5	기술지도 1식	5

< 연도별·재원별 투자계획 >                                      (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	22,725	13,725	5,000	5,000
국 비	-	-	-	-
지 방 채	3,000	-	3,000	-
시 도 비	19,725	13,725	1,000	5,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 농업용수 관로 노후화로 인한 누수·수압 저하 등으로 영농 불편이 증가함에 따라, 농업용수 관로 교체로 안정적인 농업용수 공급을 통해 영농 불편 사항 해소

47		협재리 행복한삶터 조성사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 어촌지역 주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고, 어촌지역의 계획적인 개발을 통하여 지역별 특화발전 도모 및 정주여건 개선

○ 지역 특성에 맞는 생활 인프라 확충으로 낙후된 정주 여건을 개선하여 삶의 질 향상 및 지속가능한 어촌지역 발전 도모

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 2022.06.27.: 2023년도 어촌분야 일반농산어촌개발 신규사업 선정

○ 2022.10.11.: 지방재정계획심의위원회 공기관 대행사업 심의(적정)

○ 2022.11.23.: 제주특별자치도의회 공기관 대행 보고

○ 2023.02.15.: 공기관대행 위ˑ수탁 협약 체결(한국어촌어항공단)

○ 2023.07.24.: 기본계획 수립 용역 착수

○ 2025.05.12.: 기본계획 수립 및 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2023년 ~ 2027년(5개년)

○ 위  치: 제주시 한림읍 협재리 일원

○ 내  역

(기초생활기반확충) 복합평생교육센터 신축, 협동상생복지센터 신축, 공동생활복지주택 리모델링 등

(주민역량강화사업) 교육, 컨설팅, 홍보·마케팅, 부대비 등

○ 공정률: 30%(기본계획 변경 수립 후 사업 추진)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	1식	7,085	3,580	1,940	1,358	500	82	-	-	1,565
공사비	1식	7,085	3,580	1,940	1,358	500	82	-	-	1,565

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	7,085	1식	3,580	1식	1,940	1식	1,565
공사비	복합센터 1식	7,085	복합센터 1식	3,580	복합센터 1식	1,940	복합센터 1식	1,565

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,085	3,580	1,940	1,565
국 비	4,960	2,506	1,358	1,096
지 방 채	500	-	500	-
시 도 비	1,625	1,074	82	469

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 정주여건 및 환경개선 사업을 통한 소득 창출 및 어촌마을 이미지 향상 제고

○ 마을 내 부족한 생활서비스 공간 확충을 통한 삶의 질 향상

48		제주시 화북항 어촌신활력증진사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 어촌신활력증진사업 해양수산부 공모 선정에 따른 화북항 및 그 배후마을 통합 개발을 통해 주민 불편사항을 해소하고 정주여건을 개선하여 지역 발전 도모

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 2024.01.09.: 화북항 어촌신활력증진사업 공모 선정

○ 2024.04.12.: 지방재정투자심사 심의

○ 2024.06.11.: 화북항 어촌신활력증진사업 앵커조직 위·수탁 협약 체결

○ 2024.08.29.: 앵커조직 운영계획 및 예산 심의(해양수산부, 조건부 승인)

○ 2024.09.03.: 공기관대행 심의(조건부 승인)

○ 2024.12.26.: 화북항 어촌신활력증진사업 기본계획 수립 용역 착수

○ 2025.05.07.: 화북항 어촌신활력증진사업 기본계획 수립 컨설팅

○ 2025.07.21.: 화북항 어촌신활력증진사업 기본계획 수립 해양수산부 자문 1차

4. 사업개요

○ 기  간: 2025년 ~ 2027년(3개년)

○ 위  치: 제주시 화북동 화북항 일원

○ 내  역: 화북항 정비, 어촌스테이션 신축 등

○ 공정률: 0%(기본계획 수립 후 사업 추진)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	1식	6,132	438	1,759	1,231	500	28	-	-	3,935
공사비	1식	6,132	438	1,759	1,231	500	28	-	-	3,935

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	6,132	1식	438	1식	1,759	1식	3,935
공사비	어촌스테이션 신축 1식	6,132	어촌스테이션 신축 1식	438	어촌스테이션 신축 1식	1,759	어촌스테이션 신축 1식	3,935

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,132	438	1,759	3,935
국 비	4,292	307	1,231	2,754
지 방 채	500	-	500	-
시 도 비	1,340	131	28	1,181

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 어촌의 정주여건 개선으로 지역민의 고충 해결 및 새로운 활력 도모

49		추자 인도교 및 수변공원 경관조명 설치공사

1. 사업목적 또는 필요성

○ 2025. 9. 11. 준공된 인도교 내 조명시설 부재로 야간 보행시 안전사고 위험이 높음에 따라 조명시설 설치를 통해 보행자의 안전 확보 및 쾌적한 이용환경 조성

○ 또한, 야간 경관 개선으로 관광객 유입 확대 및 지역경제 활성화 기여

2. 지방채 발행계획: 1,000백만원

3. 추진경위

○ (설계용역 완료) 2021. 12. 27.

○ (인도교 및 수변공원 조성사업 준공) 2025. 9. 11.

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. ~ 12.

○ 위  치: 제주시 추자면 영흥리 98-4번 지선

○ 내  역: 인도교 및 수변공원 경관조명 설치 1식

○ 공정률: 0%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	야간 경관조명설치	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-
공사비	야간 경관조명설치	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	경관 조명설치	1,000	-	-	경관조명설치	1,000	-	-
공사비	경관 조명설치	1,000	-	-	경관조명설치	1,000	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	1,000	-	1,000	-
지 방 채	1,000	-	1,000	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 추자주민들의 오랜 숙원사업인 인도교에 조명시설을 설치함으로써 사업의 완성도를 높이고 이용객들의 보행 안전 확보

○ 추자의 새로운 관광명소로 자리매김함으로써 관광객들에게 특화된 볼거리 제공

50		신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 남북측 도시계획도로 개설로 번영로에 집중되는 교통량을 분산하여 지역 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 4,000백만원

3. 추진경위

○ 1976. 03. 27. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018. 11. 01. 지방재정투자심사 조건부 가결

○ 2019. 04. 17. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2023. 03. 03. ‘23년 제1차 중앙투자심사 조건부 가결

4. 사업개요

○ 기  간: 2019. 01. ~ 2029. 12.(10개년)

○ 위  치: 제주시 영평동 2465-5 ~ 봉개동 2354 번지 일원

○ 내  역: 도로개설 1식(L=2,500m ,B=25m)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		48,500	18,800	4,000		4,000				25,700
공사비	L=2,500m B=25m	30,800	1,100	4,000		4,000				25,700
보상비	토지보상 160필지	17,500	17,500
부대비	1식	200	200

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	48,500		18,800		4,000		25,700
공사비	토공 1식	11,000			1식	2,500	1식	8,500
	구조물공 1식	4,500			1식	700	1식	3,800
	포장공 1식	7,000					1식	7,000
	상하수도공 1식	3,000			1식	800	1식	2,200
	부대공 1식	5,300	1식	1,100			1식	4,200
보상비	1식	17,500	1식	17,500
부대비	설계 등 1식	200	1식	200

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	48,500	18,800	4,000	25,700
국 비	-	-	-	-
지 방 채	21,240	17,240	4,000	-
시 도 비	27,260	1,560	-	25,700

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

51		한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 남북측 도시계획도로 개설로 지방도 1131호선에 집중되는 교통량을 분산하여 지역 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획 : 2,400백만 원

3. 추진경위

○ 1976. 03. 27. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018. 09. 21. 지방재정투자심사 조건부 가결

○ 2019. 05. 20. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. 실시계획 작성고시

○ 2021. 06.  ~ 2024. 12. (1구간) L=300m 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2029. 12.(10개년)

○ 위  치 : 제주시 오등동 1730-9 ~ 604-2 번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=1,820m ,B=25m)

○ 공정율 : 25%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		29,400	21,550	2,400	-	2,400	-	-	-	5,450
보상비	토지보상 162필지	20,500	19,100	1,400	-	1,400	-	-	-	-
공사비	L=1,820m B=25m	8,900	2,450	1,000	-	1,000	-	-	-	5,450

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	29,400	1식	21,550	1식	2,400	1식	5,450
보상비	1식	20,500	1식	19,100	1식	1,400	-	-
공사비	토공 1식	2,500	1식	750	1식	600	1식	1,150
	구조물공 1식	800	1식	400	-	-	1식	400
	포장공 1식	2,200	1식	600	-	-	1식	1,600
	상하수도공 1식	1,900	1식	400	1식	300	1식	1,200
	부대공 1식	1,500	1식	300	1식	100	1식	1,100

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	29,400	22,950	2,400	5,450
지 방 채	20,900	19,500	2,400	-
시 도 비	8,500	3,450	-	5,450

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

52		연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 남북측 도시계획도로 개설로 지방도 1131호선에 집중되는 교통량을 분산하여 지역 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 3,300백만원

3. 추진경위

○ 1986. 05. 22. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 03. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019. 03. 13. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2023. 03. 03. ‘23년 제1차 중앙투자심사 조건부 가결

○ 2024. 12. 06. (1공구) 1차분 공사 착수

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2028. 12.(9개년)

○ 위  치 : 제주시 화북이동 3103-2 ~ 영평동 998-3번지 일원

○ 내  역 : 도로개설 1식(L=2,100m ,B=20m)

○ 공정률 : 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		35,500	16,600	3,300		3,300				15,600
공사비	L=2,100m B=20m	18,620	1,020	2,000		2,000				15,600
보상비	토지보상 148필지	16,800	15,500	1,300		1,300
부대비	1식	80	80

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	35,500		16,600		3,300		15,600
공사비	토공 1식	5,920	1식	720	1식	1,100	1식	4,100
	구조물공 1식	1,500					1식	1,500
	포장공 1식	4,000					1식	4,000
	상하수도공 1식	2,000			1식	900	1식	1,100
	부대공 1식	5,200	1식	300			1식	4,900
보상비	1식	16,800	1식	15,500	1식	1,300
부대비	설계 등 1식	80	1식	80

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	36,200	16,600	3,300	15,600
국 비	-	-	-	-
지 방 채	18,500	15,500	3,300	-
시 도 비	17,700	1,100	-	15,600

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

53		노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 지역 주민들의 숙원사업으로서 노형교차로 남측 우회전 차로를 확장하여 교통량이 집중되는 시간대의 도심 교통난 해소에 기여

2. 지방채 발행계획 : 1,800백만 원

3. 추진경위

○ 1974. 05. 10. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2020. 05. 13. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. 실시계획 작성고시

○ 2023. 03. 03. ‘23년 제1차 중앙투자심사 조건부 가결

○ 2025. 04. 22. (1공구) 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2029. 12.(9개년)

○ 위  치 : 제주시 노형동 177-2 ~ 288-10번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=1,100m ,B=35m)

○ 공정율 : 7%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		32,100	12,100	1,800	-	1,800	-	-	-	18,200
보상비	토지보상 127필지	14,300	11,600	800	-	800	-	-	-	1,900
공사비	L=1,100m B=35m	17,700	400	1,000	-	1,000	-	-	-	16,300
부대비	1식	100	100	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	32,100	1식	12,100	1식	1,800	1식	18,200
보상비	1식	14,300	1식	11,600	1식	800	1식	1,900
공사비	토공 1식	5,000	1식	250	1식	700	1식	4,050
	구조물공 1식	3,000	-	-	-	-	1식	3,000
	포장공 1식	2,000	-	-	-	-	1식	2,000
	상하수도공 1식	3,500	1식	150	1식	300	1식	3,050
	부대공 1식	4,200	-	-	-	-	1식	4,200
부대비	설계 등 1식	100	1식	100	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	32,100	12,100	1,800	18,200
지 방 채	13,300	11,500	1,800	-
시 도 비	18,800	600	-	18,200

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

54		제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 공항 이용객 증가로 인한 교통체증이 발생하여 도시계획도로 개설로 원활한 물류수송과 지역졍제 활성화에 기여

○ 장기미집행 도시계획도로를 조기에 개설하여 사유재산권 보호

2. 지방채 발행계획: 2,500백만원

3. 추진경위

○ 1967. 10. 26. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018. 11. 01. 지방재정 중앙 투자사업 심사 조건부 가결

○ 2019. 01. 23. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2023. 12. 26. (1공구) 1차분 공사 착공

○ 2025. 01. 24. (1공구) 2차분 공사 착공

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2030. 12.(10개년)

○ 위  치 : 제주시 노형동 3-2 ~ 이호이동 1596-1번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=2,300m ,B=35m)

○ 공정률: 15%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		25,585	13,485	2,500		2,500				9,600
공사비	L=2,300m B=35m	14,300	2,200	2,500		2,500				9,600
보상비	토지보상 213필지	11,285	11,285

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	25,585		13,485		2,500		9,600
공사비	토공 1식	4,000	1식	1,300	1식	1,100	1식	1,600
	구조물공 1식	2,000	1식	500	1식	500	1식	1,000
	포장공 1식	3,000					1식	3,000
	상하수도공 1식	3,100	1식	400	1식	900	1식	1,800
	부대공 1식	2,200					1식	2,200
보상비	1식	11,285	1식	11,285

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	25,585	13,485	2,500	9,600
국 비
지 방 채	13,000	10,000	2,500	-
시 도 비	12,585	3,485	-	9,600

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

55		대유대림~간드락마을(중로1-1-1) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 지역 주민들의 숙원사업으로서 간드락마을과 연북로를 연결하여 교통량 분산 및 교통난 해소로 교통편의 제공

2. 지방채 발행계획: 2,700백만원

3. 추진경위

○ '86. 06. 27. : 도시계획시설 결정

○ '18. 04. 24. ~ '18. 07. 26. : 우선사업대상 검토 및 선정

○ '18. 09. 21. : 지방재정계획심의위원회 심의(지방재정투자심사)_조건부

○ '19. 03. 13. : 보상계획 열람공고

○ '19. 06. 17. : 보상비 책정 및 보상협의

○ '20. 04. 01. : 실시계획 열람 및 사업인정에 관한 의견청취 공고(~'20.04.16.)

○ '20. 05. 11. : 사업 인정관련 중앙토지수용위원회 협의

○ '20. 05. 13. : 기본설계용역 완료

○ '20. 06. 17. : 실시계획 작성 고시 (제주시고시 제2020-205호)

○ '23. 06. : 실시설계용역 완료

○ '24. 12. : (1공구) 전체분 및 1차분 공사 착공

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2028. 12.(9개년)

○ 위  치 : 제주시 일도이동 26-1 ~ 영평동 2672-1

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=1,885m ,B=20m)

○ 공정률: 5.4%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		29,760	19,800	2,760		2,700	60			7,200
공사비	L=1,885m B=20m	10,500	1,300	2,000		2,000				7,200
보상비	토지보상 83필지	19,260	18,500	760		700	60

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	29,760		19,800		2,760		7,200
공사비	토공 1식	4,000	1식	800	1식	1,400	1식	1,800
	구조물공 1식	1,000					1식	1,000
	포장공 1식	2,200					1식	2,200
	상하수도공 1식	2,500	1식	300	1식	600	1식	1,600
	부대공 1식	600					1식	600
보상비	1식	19,260	1식	18,500	1식	760
부대비	설계 등 1식	200	1식	200

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	29,760	19,800	2,760	7,200
국 비
지 방 채	19,500	16,800	2,700	-
시 도 비	10,260	3,000	60	7,200

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

56		아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 남북측 도시계획도로 개설로 지방도 1131호선에 집중되는 교통량을 분산하여 지역 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획 : 1,000백만 원

3. 추진경위

○ 1986. 06. 27. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018. 09. 21. 지방재정투자심사 조건부 가결

○ 2019. 01. 23. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. 실시계획 작성고시

○ 2024. 10. 22. ~ 2024. 12. 21. (1구간) 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2029. 12.(10개년)

○ 위  치 : 제주시 오라이동 3254-1 ~ 659-8 번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=1,600m ,B=20m)

○ 공정율 : 7%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		18,600	10,250	1,000	-	1,000	-	-	-	7,350
보상비	토지보상 239필지	9,800	9,800	-	-	-	-	-	-	-
공사비	L=1,600m B=20m	8,800	450	1,000	-	1,000	-	-	-	7,350

< 연도별·공종별 투자계획 >                                   (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	18,600	1식	10,250	1식	1,000	1식	7,350
보상비	1식	9,800	1식	9,800	-	-	-	-
공사비	토공 1식	2,450	1식	200	1식	700	1식	1,550
	구조물공 1식	700	1식	200	-	-	1식	500
	포장공 1식	2,200	-	-	-	-	1식	2,200
	상하수도공 1식	1,900	-	-	1식	300	1식	1,600
	부대공 1식	1,500	-	-	-	-	1식	1,500
부대비	설계 등 1식	50	1식	50	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	18,600	10,250	1,000	7,350
지 방 채	10,650	9,650	1,000	-
시 도 비	7,950	600	-	7,350

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

57		이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 주거지역 내 도시계획도로 개설로 주민들에게 교통편의 제공

2. 지방채 발행계획 : 200백만 원

3. 추진경위

○ 1977. 02. 08. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019. 03. 06. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. 실시계획 작성고시

○ 2025. 05. 16. 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2028. 12.(8개년)

○ 위  치 : 제주시 이호이동 200-4 ~ 118-4 번지 일원

○ 내  역 : 도로개설 1식(L=360m, B=10m)

○ 공정율 : 5%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		4,300	2,700	200	-	200		-	-	1,400
보상비	토지보상 23필지	2,600	2,500	100	-			-	-	-
공사비	L=360m B=10m	1,700	200	100	-	200	-	-	-	1,400

< 연도별·공종별 투자계획 >                                   (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	4,300	1식	2,700	1식	200	1식	1,400
보상비	1식	2,600	1식	2,500			-	-
공사비	토공 1식	600	1식	200	1식	200	1식	300
	구조물공 1식	250	-	-	-	-	1식	250
	포장공 1식	300	-	-	-	-	1식	300
	상하수도공 1식	350	-	-	-	-	1식	350
	부대공 1식	200	-	-	-	-	1식	200

< 연도별·재원별 투자계획 >                                   (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,300	2,700	200	1,400
지 방 채	1,200	1,000	200	-
시 도 비	3,100	1,700		1,400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주거지역 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

58		애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 읍면지역 도로 확장 및 진입로 확충으로 교통 편의 제공 및 교통난 해소에 기여

2. 지방채 발행계획 : 1,000백만 원

3. 추진경위

○ 1981. 04. 22. : 도시계획시설 결정

○ 2019. 09. 20. : 도시계획위원회 심의(도로선형 변경 관련)

○ 2019. 10. 17. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

○ 2020. 02. 26. : 실시계획 열람 및 사업인정에 관한 의견청취 공고

○ 2020. 03. 05. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 03. 11. : 보상계획 열람공고

○ 2020. 04. 23. : 사업인정관련 중앙토지수용위원회 협의

○ 2020. 06. 10. : 실시계획 작성 고시 (제주시고시 제2020-196호)

○ 2024. 12. ~ 2025. 6. : 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2026. 12.(7개년)

○ 위  치 : 제주시 애월읍 애월리 1661-1 ~ 애월리 1603번지 일원

○ 내  역 : 도로개설 1식(L=350m ,B=12m)

○ 공정율 : 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		4,400	2,472	1,000	-	1,000	-	-	-	928
보상비	토지보상 33필지	2,200	2,172	-	-	-	-	-	-	28
공사비	L=350m B=12m	2,200	300	1,000	-	1,000	-	-	-	900

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	4,400	1식	2,472	1식	1,000	1식	928
보상비	1식	2,200	1식	2,172	-	-	1식	28
공사비	토공 1식	580	1식	80	1식	200	1식	200
	구조물공 1식	350	-	-	1식	150	1식	200
	배수공 1식	370	1식	70	1식	150	1식	150
	포장공 1식	300	1식	50	1식	100	1식	150
	상하수도공 1식	170	1식	20	1식	100	1식	50
	부대공 1식	530	1식	80	1식	300	1식	150

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,400	2,472	1,000	928
지 방 채	1,000	-	1,000	-
시 도 비	3,400	2,472	-	928

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍면지역 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

59		함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 마을 진입을 위한 도시계획도로 개설로 지역주민 교통편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로를 조기에 개설하여 사유재산권 보호

2. 지방채 발행계획 : 1,000백만 원

3. 추진경위

○ 2003. 01. 08. : 도시계획시설 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 2018. 07. 26. : 우선사업대상 검토 및 선정

○ 2019. 03. 06. : 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. : 실시계획 작성 고시 (제주시고시 제2020-196호)

○ 2024. 12. 18. : 전체분 및 1차분 공사 착공

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. 〜 2026. 12.(7개년)

○ 위  치 : 제주시 조천읍 신흥리 234-2∼함덕리 3570-1번지 일원

○ 내  역 : 도로개설 1식(L=735m, B=15m)

○ 공정율 : 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		5,500	2,700	1,000	-	1,000	-	-	-	1,800
보상비	토지보상 64필지	2,500	2,200	300	-	300	-	-	-	-
공사비	L=735m B=15m	2,900	400	700	-	700	-	-	-	1,800
부대비	1식	100	100	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	5,500	1식	2,700	1식	1,000	1식	1,800
보상비	1식	2,500	1식	2,200	1식	300	-	-
공사비	토공 1식	600	1식	200	1식	300	1식	100
	구조물공 1식	500	-	-	1식	100	1식	400
	포장공 1식	800	-	-			1식	800
	상하수도공 1식	600	1식	200	1식	300	1식	100
	부대공 1식	400	-	-			1식	400
부대비	설계 등 1식	100	1식	100	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	5,500	2,700	1,000	1,800
지 방 채	1,000	-	1,000	-
시 도 비	4,500	2,700	-	1,800

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

60		한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 동 지역 내 도시계획도로 개설로 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 200백만원

3. 추진경위

○ 1986. 06. 27. : 도시계획시설 결정

○ 2018. 09. 21. : 지방재정계획심의위원회 심의(지방재정투자심사)_조건부

○ 2019. 01. 17. : 보상계획 열람공고

○ 2019. 12. 04. : 실시계획 열람 및 사업인정 의견청취 공고(~'19.12.18.)

○ 2019. 12. 23. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 04. 09. : 사업인정 관련 중앙토지수용위원회 협의

○ 2020. 06. 10. : 실시계획 작성 고시 (제주시고시 제2020-196호)

○ 2024. 06. ~ 2024. 09. : 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2026. 12.(7개년)

○ 위  치 : 제주시 노형동 1551-4 ~ 1634번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=520m ,B=15m)

○ 공정률: 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		9,000	6,150	200	-	200	-	-	-	2,650
공사비	L=520m B=12m	3,300	450	200	-	200	-	-	-	2,650
보상비	토지보상 16필지	5,700	5,700	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	9,000		6,150		200		2,650
공사비	토공 1식	650	1식	100	1식	200	1식	350
	우수공 1식	550	1식	100			1식	450
	오수공 1식	550	1식	100			1식	450
	구조물공 1식	500	1식	100			1식	400
	포장공 1식	400					1식	400
	상하수도공 1식	500	1식	50			1식	450
	부대공 1식	150					1식	150
보상비	1식	5,700	1식	5,700

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,000	6,150	200	2,650
국 비	-	-	-	-
지 방 채	4,200	4,000	200	-
시 도 비	4,800	2,150	-	2,650

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍면지역 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

61		아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 남북측 도시계획도로 개설로 지방도 1131호선에 집중되는 교통량을 분산하여 지역 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획 : 700백만 원

3. 추진경위

○ 1986. 06. 27. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018. 09. 21. 지방재정투자심사 조건부 가결

○ 2019. 01. 23. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. 실시계획 작성고시

○ 2024. 04. 22. ~ 2024. 10. 18. 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2028. 12.(9개년)

○ 위  치 : 제주시 연동 421-7 ~  489-8 번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=600m ,B=20m)

○ 공정율 : 15%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		10,800	7,650	700	-	700	-	-	-	2,450
보상비	토지보상 113필지	7,200	7,200	-	-	-	-	-	-	-
공사비	L=600m B=20m	3,550	400	700	-	700	-	-	-	2,450
부대비	1식	50	50	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	10,800	1식	7,650	1식	700	1식	2,450
보상비	1식	7,200	1식	7,200	-	-	-	-
공사비	토공 1식	1,100	1식	200	1식	500	1식	400
	구조물공 1식	350	1식	200	1식		-	150
	포장공 1식	900	-	-	-	-	1식	900
	상하수도공 1식	600	-	-	1식	200	1식	400
	부대공 1식	600	-	-	1식		1식	600
부대비	설계 등 1식	50	1식	50	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	10,800	7,650	700	2,450
지 방 채	7,900	6,900	700	-
시 도 비	2,900	750	-	2,450

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

62		도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 주거지역 내 도시계획도로 개설로 주민들에게 교통편의 제공

2. 지방채 발행계획 : 2,400백만 원

3. 추진경위

○ 1993. 09. 27. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018. 09. 21. 지방재정투자심사(조건부) 가결

○ 2019. 10. 30. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. 실시계획 작성고시

○ 2024. 12. ~ 2025. 06. 14. 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2028. 12.(8개년)

○ 위  치 : 제주시 도련일동 1772-1 ~ 1624-2번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=1,760m ,B=10m)

○ 공정율 : 13%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		16,200	10,100	2,400	-	2,400	-	-	-	3,700
보상비	토지보상 137필지	12,500	9,600	1,400	-	1,400	-	-	-	1,500
공사비	L=1,760m B=10m	3,650	450	1,000	-	1,000	-	-	-	2,200
부대비	1식	50	50	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	16,200		10,100		2,400		3,700
보상비	1식	12,500	1식	9,600	1식	1,400	1식	1,500
공사비	토공 1식	1,050	1식	350	1식	500	1식	200
	구조물공 1식	300			1식	200	1식	100
	포장공 1식	800					1식	800
	상하수도공 1식	600	1식	100	1식	300	1식	200
	부대공 1식	900					1식	900
부대비	설계 등 1식	50	1식	50	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	16,200	10,100	2,400	3,700
지 방 채	11,900	9,500	2,400	-
시 도 비	4,300	600	-	3,700

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주거지역 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

63		제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 남북측 도시계획도로 개설로 대중교통 체계개편에 따른 지방도 1131호선에 집중되는 교통량을 분산하여 소통의 원활에 기여

○ 장기미집행 도시계획도로를 조기에 개설하여 사유재산권 보호

2. 지방채 발행계획 : 500백만 원

3. 추진경위

○ 2002. 04. 29. : 도시계획시설 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 2018. 07. 26. : 우선사업대상 검토 및 선정

○ 2018. 09. 21. : 지방재정계획심의위원회 심의(지방재정투자심사)_조건부

○ 2019. 01. 16. : 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. : 실시계획 작성 고시

○ 2020. 11. ~ 2023. 12월 : 1~5차분 공사 추진

○ 2024. 07. : 6차분 공사 착수

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2027. 12.(8개년)

○ 위  치 : 제주시 아라이동 30-6∼아라이동 1021-8 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=2,170m ,B=15m)

○ 공정율 : 62%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		17,000	13,900	500	-	500	-	-	-	2,600
보상비	토지보상 99필지	7,600	7,600	-	-	-	-	-	-	-
공사비	L=2,170m B=15m	9,100	6,000	500	-	500	-	-	-	2,600
부대비	1식	300	300	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                 (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	17,000	1식	13,900	1식	500	1식	2,600
보상비	1식	7,600	1식	7,600	-	-	-	-
공사비	토공 1식	2,800	1식	1,800	1식	300	1식	700
	구조물공 1식	2,300	1식	1,500	1식	100	1식	700
	포장공 1식	1,800	1식	1,300			1식	500
	상하수도공 1식	1,300	1식	900	1식	100	1식	300
	부대공 1식	900	1식	500	1식		1식	400
부대비	설계 등 1식	300	1식	300	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                 (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	17,000	13,900	500	2,600
지 방 채	8.900	8,200	500	200
시 도 비	8,100	5,700	-	2,400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

64		귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 읍면지역 내 도시계획도로 개설로 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획 : 1,100백만 원

3. 추진경위

○ 1978. 04. 26. : 도시계획시설 결정

○ 2018. 09. 21. : 지방재정계획심의위원회 심의(지방재정투자심사)_조건부

○ 2019. 12. 07. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 12. 18. : 실시계획 열람 및 사업인정에 관한 의견청취 공고

○ 2020. 04. 09. : 사업인정관련 중앙토지수용위원회 협의

○ 2020. 04. 29. : 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. : 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시,

실시계획 작성 고시 (제주시고시 제2020-207호)

○ 2024. 12. : 전체분 및 1차분 공사 착공

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2026. 12.(6개년)

○ 위  치 : 제주시 한림읍 귀덕리 3009 ~ 귀덕리 642-1번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=1,071m ,B=12m)

○ 공정율 : 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		8,400	4,340	1,150	-	1,150	50	-	-	2,910
보상비	토지보상 81필지	4,300	3,840	150	-	100	50	-	-	310
공사비	L=1,071m B=12m	4,100	500	1,000	-	1,000	-	-	-	2,600

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	8,400	1식	4,340	1식	1,150	1식	2,910
보상비	1식	4,300	1식	3,840	1식	150	1식	310
공사비	토공 1식	900	1식	200	1식	100	1식	600
	우수공 1식	520	1식	70	1식	150	1식	300
	오수공 1식	520	1식	70	1식	150	1식	300
	구조물공 1식	600	1식	100	1식	150	1식	350
	포장공 1식	550	-	-	1식	200	1식	350
	상하수도공 1식	510	1식	60	1식	100	1식	350
	부대공 1식	500	-	-	1식	150	1식	350

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	8,400	4,340	1,150	2,910
지 방 채	2,100	1,000	1,100	-
시 도 비	6,300	3,340	50	2,910

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍면지역 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

65		용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 남북측 도시계획도로 개설로 지방도 1131호선에 집중되는 교통량을 분산하여 지역 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 2,500백만 원

3. 추진경위

○ 1986. 05. 22. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 03. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2020. 04. 29. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2024. 12. ~ 2025. 07. 23. 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2028. 12.(8개년)

○ 위  치 : 제주시 용강동 1554-2 ~ 768-2번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=690m ,B=20m)

○ 공정율 : 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		9,500	4,070	2,530	-	2,500	30	-	-	2,900
보상비	토지보상 102필지	5,100	3,570	1,530	-	1,500	30	-	-	-
공사비	L=620m B=35m	4,340	440	1,000	-	1,000	-	-	-	2,900
부대비	1식	60	60		-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	9,500	1식	4,070	1식	2,530	1식	2,900
보상비	1식	5,100	1식	3,570	1식	1,530	-	-
공사비	토공 1식	1,100	1식	240	1식	600	1식	260
	구조물공 1식	800	1식	100	1식	200	1식	500
	포장공 1식	600	-	-	-	-	1식	600
	상하수도공 1식	800	1식	100	1식	200	1식	500
	부대공 1식	1,040	-	-	-	-	1식	1,040
부대비	설계 등 1식	60	1식	60	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,500	4,070	2,530	2,900
지 방 채	5,300	2,800	2,500	-
시 도 비	4,200	1,270	30	2,900

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

66		하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 읍면지역 내 도시계획도로 개설로 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획 : 900백만 원

3. 추진경위

○ 1981. 04. 22. : 도시계획시설 결정

○ 2018. 09. 21. : 지방재정계획심의위원회 심의(지방재정투자심사)_조건부

○ 2019. 04. 17. : 보상계획 열람공고 및 감정평가 의뢰

○ 2019. 11. 30. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 12. 18. : 실시계획 열람 및 사업인정에 관한 의견청취 공고(

○ 2020. 04. 23. : 사업인정관련 중앙토지수용위원회 협의

○ 2020. 06. 10. : 실시계획 작성 고시 (제주시고시 제2020-196호)

○ 2024. 11. : 전체분 및 1차분 공사 착수

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2025. 12.(6개년)

○ 위  치 : 제주시 구좌읍 하도리 1136-1 ~ 1701-8번지 일원

○ 내  역 : 도로개설 1식(L=1,495m ,B=12m)

○ 공정율 : 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		9,300	5,200	900	-	900	-	-	-	3,200
보상비	토지보상 78필지	4,700	4,700	-	-	-	-	-	-	-
공사비	L=1,495m B=12m	4,600	500	900	-	900	-	-	-	3,200

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	9,300	1식	5,200	1식	900	1식	3,200
보상비	1식	4,700	1식	4,700	-	-	-	-
공사비	토공 1식	1,000	1식	250	1식	250	1식	500
	우수공 1식	800	1식	100	1식	200	1식	500
	오수공 1식	800	1식	100	1식	200	1식	500
	구조물공 1식	600		-	1식	100	1식	500
	포장공 1식	600		-	-	-	1식	600
	상하수도공 1식	650	1식	50	1식	100	1식	500
	부대공 1식	150		-	1식	50	1식	100

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,300	5,200	900	3,200
지 방 채	5,000	3,000	900	1,100
시 도 비	4,300	2,200	-	2,100

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍면지역 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

67		한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 읍면지역 도로 확장 및 진입로 확충으로 교통 편의 제공 및 교통난 해소에 기여

2. 지방채 발행계획: 1,000백만 원

3. 추진경위

○ 1986. 04. 04. : 도시계획시설 결정

○ 2019. 02. 13. : 보상계획 열람공고

○ 2019. 10. 17. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 11. 27. : 실시계획 열람 및 사업인정에 관한 의견청취 공고

○ 2020. 04. 09. : 사업인정관련 중앙토지수용위원회 협의

○ 2020. 06. 10. : 실시계획 작성 고시 (제주시고시 제2020-196호)

○ 2023. 11. 13 : 보완설계용역 완료

○ 2023. 12. ~ 2024. 06. : 1차분 공사 추진 (2024. 7. 5. 일시정지)

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2025. 12.(6개년)

○ 위  치 : 제주시 한림읍 대림리 1855 ~ 한림리 574번지 일원

○ 내  역 : 도로개설 1식(L=575m ,B=8m)

○ 공정율 : 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,250	1,400	1,000	-	1,000	-	-	-	3,850
보상비	토지보상 35필지	950	950	-	-	-	-	-	-	-
공사비	L=575m B=8m	5,300	450	1,000	-	1,000	-	-	-	3,850

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	6,250	1식	1,400	1식	1,000	1식	3,850
보상비	1식	950	1식	950	-	-	-	-
공사비	토공 1식	850	1식	150	1식	200	1식	500
	구조물공 1식	2,050	-	-	1식	200	1식	1,850
	배수공 1식	800	1식	100	1식	200	1식	500
	포장공 1식	550	1식	100	1식	150	1식	300
	상하수도공 1식	350	1식	50	1식	100	1식	200
	부대공 1식	700	1식	50	1식	150	1식	500

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,250	1,400	1,000	3,850
지 방 채	1,000	-	1,000	-
시 도 비	5,250	1,400	-	3,850

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍면지역 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

68		애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 읍면지역 내 도시계획도로 개설로 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 1,000백만 원

3. 추진경위

○ 1981. 04. 22. : 도시계획시설 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 2018. 07. 26. : 우선사업대상 검토 및 선정

○ 2018. 09. 21. : 지방재정계획심의위원회 심의(지방재정투자심사)_조건부

○ 2019. 10. 24. : 실시설계용역 완료

○ 2020. 02. 05. : 실시계획 열람 및 사업인정에 관한 의견청취 공고

○ 2020. 04. 23. : 사업인정관련 중앙토지수용위원회 협의

○ 2023. 12. ~ 2024. 06. : 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2025. 12.(6개년)

○ 위  치 : 제주시 신엄리 2671-1 ~ 762-2번지 일원

○ 내  역 : 도로개설 1식(L=1,170m ,B=12m)

○ 공정율 : 10%

< 사업총괄 >	(단위 : 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		15,400	9,550	1,000	-	1,000	-	-	-	4,850
보상비	토지보상 79필지	9,100	9,100	-	-	-	-	-	-	-
공사비	L=1,170m B=12m	6,300	450	1,000	-	1,000	-	-	-	4,850

< 연도별·공종별 투자계획 >                                   (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	15,400	1식	9,550	1식	1,000	1식	4,850
보상비	1식	9,100	1식	9,100	-	-	-	-
공사비	토공 1식	1,350	1식	350	1식	300	1식	700
	우수공 1식	900	1식	50	1식	200	1식	650
	오수공 1식	900	1식	50	1식	200	1식	650
	구조물공 1식	650	-	-	1식	100	1식	550
	포장공 1식	650	-	-	1식	100	1식	550
	상하수도공 1식	450	-	-	1식	100	1식	350
	부대공 1식	1,400	-	-	-	-	1식	1,400

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	15,400	9,550	1,000	4,850
지 방 채	6,210	5,210	1,000	-
시 도 비	9,190	4,340	-	4,850

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍면지역 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

69		연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 남북측 도시계획도로 개설로 지방도 1131호선에 집중되는 교통량을 분산하여 지역 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 1986. 05. 22. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 24. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018. 09. 21. 지방재정투자심사 조건부 가결

○ 2019. 01. 09. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. 실시계획 작성고시

○ 2024. 12. 26. ~ 2025. 04. 24. 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2028. 12.(9개년)

○ 위  치 : 제주시 화북일동 4731-1 ~ 5168-1번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=620m ,B=35m)

○ 공정율 : 7%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		22,600	16,450	2,000		2,000				4,150
공사비	L=1,000m B=20~35m	6,550	400	2,000		2,000				4,150
보상비	토지보상 77필지	16,000	16,000
부대비	1식	50	50

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	22,600		16,450		2,000		4,150
공사비	토공 1식	2,150	1식	300	1식	900	1식	950
	구조물공 1식	900			1식	300	1식	600
	포장공 1식	1,700					1식	1,700
	상하수도공 1식	1,100	1식	100	1식	600	1식	400
	부대공 1식	700			1식	200	1식	500
보상비	1식	16,000	1식	16,000
부대비	설계 등 1식	50	1식	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	22,600	16,450	2,000	4,150
국 비
지 방 채	18,000	16,000	2,000	-
시 도 비	4,600	450	-	4,150

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

70		오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 연북로와 연삼로를 연결하는 남북측 도시계획도로 개설사업으로 교통량 분산 및 도심 교통난 해소로 교통편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로를 조기에 개설하여 사유재산권 보호

2. 지방채 발행계획: 2,200백만원

3. 추진경위

○ '02. 04. 29. : 도시계획시설 결정

○ '18. 04. 24. ~ '18. 07. 26. : 우선사업대상 검토 및 선정

○ '18. 09. 21. : 지방재정계획심의위원회 심의(지방재정투자심사)_조건부

○ '19. 04. 03. : 보상계획 열람공고

○ '19. 06. 17. : 보상비 책정 및 보상협의

○ '19. 11. 29. : 실시설계용역 완료

○ '19. 12. 11. : 실시계획 열람 및 사업인정 의견청취 공고(~'19.12.25.)

○ '20. 04. 23. : 사업인정 관련 중앙토지수용위원회 협의

○ '20. 06. 10. : 실시계획 작성 고시 (제주시고시 제2020-196호)

○ '23. 02. : 보완설계용역 추진

○ '23. 07. : 1차분 공사 착공

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2029. 12.(9개년)

○ 위  치 : 제주시 오라이동 2146-7 ~ 오라이동 1704

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=1,325m ,B=20m)

○ 공정율 : 8.3%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		28,740	21,710	2,200		2,200				4,830
공사비	L=1,325m B=20m	7,200	1,000	2,000		2,000				4,200
보상비	토지보상 124필지	21,540	20,710	200		200				630

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	28,740		21,710		2,200		4,830
공사비	토공 1식	3,000	1식	800	1식	800	1식	1,400
	구조물공 1식	1,000			1식	300	1식	700
	포장공 1식	1,500					1식	1,500
	상하수도공 1식	1,000			1식	700	1식	300
	부대공 1식	500			1식	200	1식	300
보상비	1식	21,540	1식	20,710	1식	200	1식	630
부대비	설계 등 1식	200	1식	200

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	28,740	21,710	2,200	4,830
국 비	-	-	-	-
지 방 채	19,100	16,900	2,200	-
시 도 비	9,640	4,810	-	4,830

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

71		화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획시설 일몰제가 시행되기 이전 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 보호

○ 남북측 도시계획도로 개설로 지방도 1131호선에 집중되는 교통량을 분산하여 지역 주민들에게 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 3,000백만원

3. 추진경위

○ 1986. 05. 22. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 04. 03. ~ 07. 26. 장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019. 01. 09. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 10. 실시계획 작성고시

○ 2023. 03. 03. ‘23년 제1차 중앙투자심사 조건부 가결

○ 2024. 12. 06. ~ 2025. 03. 27. 1차분 공사 추진

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2028. 12.(9개년)

○ 위  치 : 제주시 화북일동 4731-1 ~ 5168-1번지 일원

○ 내  역 : 도로확장 1식(L=620m ,B=35m)

○ 공정율 : 7%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		34,810	26,760	3,050		3,000	50			5,000
공사비	L=620m B=35m	7,451	451	2,000		2,000				5,000
보상비	토지보상 103필지	27,310	26,260	1,050		1,000	50
부대비	1식	49	49

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	34,810		26,760		3,050		5,000
공사비	토공 1식	2,151	1식	451	1식	900	1식	800
	구조물공 1식	1,500			1식	300	1식	1,200
	포장공 1식	1,500					1식	1,500
	상하수도공 1식	1,200			1식	600	1식	600
	부대공 1식	1,100			1식	200	1식	900
보상비	1식	27,310	1식	26,260	1식	1,050
부대비	설계 등 1식	49	1식	49

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	34,810	26,760	3,050	5,000
국 비
지 방 채	27,000	24,000	3,000	-
시 도 비	7,810	2,760	50	5,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역 주민들에게 교통 편의 제공

72		중앙중~오남로간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 오라동 지역 건축경기 활성화로 인한 교통량 증가로 지역주민 교통 불편 해소

○ 도시기반시설 확충으로 신제주지역~구제주지역간 교통량 분산

2. 지방채 발행계획: 3,000백만원

3. 추진경위

○ 2002. 4. 29. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2016. 6. 1. 보상비 책정 및 보상협의 추진

○ 2022. 5. ~ 2023. 12. 1·2차분 공사 준공

○ 2024. 11. 공사 타절분 1차분 공사 착공

○ 2025. 6. 1차분 준공 및 2차분 착공

※ 전체 65필지 25,959㎡중 53필지 22,374㎡ 보상완료(86%)

4. 사업개요

○ 기  간: 2015년~2027년 (12개년)

○ 위  치: 제주시 연동 353-5 ~ 오라이동 1449-4

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=1,350m, B=20m

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		26,659	18,059	3,000		3,000				5,600
보상비	1식	17,559	14,559							3,000
공사비	L=1,350m, B=20m	9,100	3,500	3,000		3,000				2,600

< 연도별·공종별 투자계획 >                                      (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	26,659		18,059		3,000		5,600
보상비	1식	17,559	1식	14,559			1식	3,000
공사비	토공 1식	3,000	1식	2,000	1식	1,000
	구조물공 1식	1,100	1식	500	1식	500	1식	100
	포장공 1식	2,000					1식	2,000
	상하수도공 1식	2,000	1식	1,000	1식	1,000
	부대공 1식	1,000			1식	500	1식	500

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	26,659	18,059	3,000	5,600
국 비
지 방 채	3,000	-	3,000	-
시 도 비	23,659	18,059	-	5,600

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

73		산천단(5.16도로, 대로1-1-9호선) 도시계획도로 확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 산천단(5.16도로) 인근 도시계획도로 미확장에 따라 병목현상이 발생하여 안전사고 예방 및 원활한 교통흐름 개선

○ 도시계획도로 기반시설 확충으로 주민편의를 제고하고 사유재산권 행사로 인한 갈등 해소

2. 지방채 발행계획: 1,500백만원

3. 추진경위

○ 1986. 5 : 도시계획시설 결정

○ 2020. 4. : 실시계획 작성 고시(제주시고시 제2020-155호)

※ 전체 30필지 17,635㎡중 29필지 17,438㎡ 보상완료(98.9%)

4. 사업개요

○ 기  간: 2021년~2028년 (8개년)

○ 위  치: 제주시 아라일동 396-42 ~ 아라일동 376-2

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=600m, B=35m

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		3,500	800	1,500		1,500				1,200
보상비	1식	100	100	-	-	-	-	-	-	-
공사비	L=600m, B=35m	3,400	700	1,500	-	1,500	-	-	-	1,200

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	3,500		800		1,500		1,200
보상비	1식	100	1식	100
공사비	토공 1식	500	1식	500
	구조물공 1식	1,000			1식	500	1식	500
	포장공 1식	800			1식	500	1식	300
	상하수도공 1식	800	1식	100	1식	500	1식	200
	부대공 1식	300	1식	100			1식	200

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	3,500	800	1,500	1,200
국 비	-	-	-	-
지 방 채	1,500	-	1,500	-
시 도 비	2,000	800	-	1,200

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

74		신산마을(소로1-9) 도시계획도로 개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 신산마을 내 기존 도로 폭 협소로 차량 교행 불편, 안전사고 위험으로 도시기반시설 확충으로 지역주민들에게 교통량 분산 및 교통편의 제공

2. 지방채 발행계획: 1,000백만원

3. 추진경위

○ 2017. 4. 도시계획시설(도로) 결정

4. 사업개요

○ 기  간: 2025년~2030년 (5개년)

○ 위  치: 제주시 내도동 275-1 ~ 도평동 19-1

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=2,010m, B=10m

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		7,300	150	1,000		1,000				6,150
보상비	1식	3,300	150	1,000		1,000				2,150
공사비	L=2,010m, B=20m	3,950								3,950
부대비	1식	50								50

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	7,300		150		1,000		6,150
보상비	1식	3,300	1식	150	1식	1,000	1식	2,150
공사비	토공 1식	1,000					1식	1,000
	구조물공 1식	850					1식	850
	포장공 1식	850					1식	850
	상하수도공 1식	750					1식	750
	부대공 1식	500					1식	500
부대비	설계 등 1식	50					1식	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,300	150	1,000	6,150
국 비
지 방 채	1,000	-	1,000	-
시 도 비	6,300	150	-	6,150

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

75		애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선) 확장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서부중학교 신설 예정으로 학교시설에 부합되는 통학로 확보 등 기반시설 확충

○ 제주시 서부지역 남북간(애조로~외도간)을 연결하는 도로 개설·확장으로 교통난 해소

2. 지방채 발행계획: 1,000백만원

3. 추진경위

○ 2017. 4. 도시계획시설(도로) 결정

○ 2022. 3. 도시계획시설(도로) 변경(B=10m→B=12m)

○ 2023. 1. ~ 보상협의 지속 추진

※ 전체 124필지 15,409㎡중 61필지 7,365㎡ 보상완료(48%)

4. 사업개요

○ 기  간: 2021년~2031년 (10개년)

○ 위  치: 제주시 외도일동 131-2 ~ 애월읍 광령리 1872-2

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=1,580m, B=10~15m

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		8,400	3,150	1,000		1,000				4,250
보상비	1식	3,800	3,100	-		-				700
공사비	L=1,580m, B=10~15m	4,600	50	1,000		1,000				3,550

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	8,400		3,150		1,000		4,250
보상비	1식	3,800	1식	3,100	1식	-	1식	700
공사비	토공 1식	1,500			1식	200	1식	1,300
	구조물공 1식	500			1식	-	1식	500
	포장공 1식	1,500			1식	500	1식	1,000
	상하수도공 1식	1,000			1식	300	1식	700
	부대공 1식	100	1식	50	1식		1식	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	8,400	3,150	1,000	4,250
국 비
지 방 채	1,000	-	1,000	-
시 도 비	7,400	3,150	-	4,250

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 교통난 해소와 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 2027년 3월에 서부중학교 개교 예정에 맞춰 안전한 통학로 확보 및 학생 및 지역주민들에게 쾌적한 도로환경 제공

76		장기미집행 도시계획시설(남조봉공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시공원 내 사유지 매입을 통해 일몰 대비 및 시민의 여가와 휴식 공간 확보

2. 지방채 발행계획 : 4,500백만 원

3. 추진경위

○ 1974. 05. 10. 도시계획시설(공원) 결정

○ 2019. 01. 09. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2023. 03. 16. ~ 11. 30. 타당성 조사 완료(지방행정연구원)

○ 2024. 03. 19. ‘24년 제1차 중앙투자심사 조건부 가결

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2025. 12.(7개년)

○ 위  치 : 제주시 연동 1010번지 일원

○ 내  역 : 편입 토지 사유지 매입 465필지(A=1,675,230㎡)

< 사업총괄 >                                             (단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	토지보상 465필지	121,100	103,500	4,500	-	4,500	-	-	-	13,100

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	1식	121,100		103,500		4,500		13,100

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	121,100	103,500	4,500	13,100
지 방 채	117,900	101,900	4,500	11,500
시 도 비	3,200	1,600	-	1,600

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 녹지 공간을 확보하여 시민의 여가와 휴식 공간 제공 및 무분별한 개발 방지

77		장기미집행 도시계획시설(서부공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시공원 내 사유지 매입을 통해 일몰 대비 및 시민의 여가와 휴식 공간 확보

2. 지방채 발행계획 : 4,000백만 원

3. 추진경위

○ 2001. 08. 11. 도시계획시설(공원) 결정

○ 2018. 03. 07. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2023. 03. 16. ~ 11. 30. 타당성 조사 완료(지방행정연구원)

○ 2024. 03. 19. ‘24년 제1차 중앙투자심사 조건부 가결

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2025. 12.(6개년)

○ 위  치 : 제주시 용담이동 1835번지 일원

○ 내  역 : 편입 토지 사유지 매입 160필지(A=178,540㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	토지보상 160필지	59,600	52,200	4,000	-	4,000	-	-	-	3,400

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	1식	59,600		52,200		4,000		3,400

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	59,600	52,200	4,000	3,400
지 방 채	56,900	50,900	4,000	2,000
시 도 비	2,700	1,300	-	1,400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 녹지 공간을 확보하여 시민의 여가와 휴식 공간 제공 및 무분별한 개발 방지

78		장기미집행 도시계획시설(용담공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시공원 내 사유지 매입을 통해 일몰 대비 및 시민의 여가와 휴식 공간 확보

2. 지방채 발행계획 : 3,000백만 원

3. 추진경위

○ 1952. 03. 25. 도시계획시설(공원) 결정

○ 2018. 11. 08. ‘18년 제3차 중앙투자심사 조건부 가결

○ 2019. 01. 09. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2025. 12.(6개년)

○ 위  치 : 제주시 용담일동 373번지 일원

○ 내  역 : 편입 토지 사유지 매입 181필지(A=146,680㎡)

< 사업총괄 >	(단위 : 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	토지보상 181필지	36,500	33,500	3,000		3,000

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	1식	36,500		33,500		3,000

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	36,500	33,500	3,000
지 방 채	32,500	29,500	3,000
시 도 비	4,000	4,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 녹지 공간을 확보하여 시민의 여가와 휴식 공간 제공 및 무분별한 개발 방지

79		장기미집행 도시계획시설(명월공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시공원 내 사유지 매입을 통해 일몰 대비 및 시민의 여가와 휴식 공간 확보

2. 지방채 발행계획 : 4,500백만 원

3. 추진경위

○ 1965. 06. 22. 도시계획시설(공원) 결정

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2021. 01. 06. 보상계획 열람공고

○ 2023. 03. 03. ‘23년 제1차 중앙투자심사 조건부 가결

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2025. 12.(6개년)

○ 위  치 : 제주시 한림읍 명월리 2200번지 일원

○ 내  역 : 편입 토지 사유지 매입 344필지(A=265,990㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2026년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	토지보상 344필지	34,400	23,800	4,500		4,500				6,100

< 연도별·공종별 투자계획 >                                   (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	1식	34,400		23,800		4,500		6,100

< 연도별·재원별 투자계획 >                                   (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	34,400	23,800	4,500	6,100
지 방 채	28,300	23,800	4,500
시 도 비	6,100			6,100

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 녹지 공간을 확보하여 시민의 여가와 휴식 공간 제공 및 무분별한 개발 방지

80		장기미집행 도시계획시설(사라봉공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시공원 내 사유지 매입을 통해 일몰 대비 및 시민의 여가와 휴식 공간 확보

2. 지방채 발행계획 : 6,200백만 원

3. 추진경위

○ 1962. 09. 19. 도시계획시설(공원) 결정

○ 2018. 10. 04. 보상계획 열람공고

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2023. 03. 16. ~ 11. 30. 타당성 조사 완료(지방행정연구원)

○ 2024. 03. 19. ‘24년 제1차 중앙투자심사 조건부 가결

4. 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2025. 12.(7개년)

○ 위  치 : 제주시 건입동 387-1번지 일원

○ 내  역 : 편입 토지 사유지 매입 693필지(A=1,006,520㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	토지보상 693필지	68,200	59,000	6,200	-	6,200	-	-	-	3,000

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	1식	68,200		59,000		6,200		3,000

< 연도별·재원별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	68,200	59,000	6,200	3,000
지 방 채	64,300	56,300	6,200	1,800
시 도 비	3,900	2,700	-	1,200

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 녹지 공간을 확보하여 시민의 여가와 휴식 공간 제공 및 무분별한 개발 방지

81		장기미집행 도시계획시설(대림공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시공원 내 사유지 매입을 통해 일몰 대비 및 시민의 여가와 휴식 공간 확보

2. 지방채 발행계획 : 3,000백만 원

3. 추진경위

○ 1965. 06. 22. 도시계획시설(공원) 결정

○ 2020. 06. 17. 실시계획 작성고시

○ 2021. 01. 06. 보상계획 열람공고

○ 2021. 10. 07. ‘21년 제4차 지방재정 투자심사 조건부 가결

4. 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2025. 12.(6개년)

○ 위  치 : 제주시 한림읍 대림리 977번지 일원

○ 내  역 : 편입 토지 사유지 매입 219필지(A=190,240㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	토지보상 219필지	27,000	24,000	3,000		3,000

< 연도별·공종별 투자계획 >                                  (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	1식	27,000		24,000		3,000

< 연도별·재원별 투자계획 >                          (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	27,000	24,000	3,000
지 방 채	22,000	22,000	3,000
시 도 비	2,000	2,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 제주시 도심지 녹지 공간을 확보하여 시민의 여가와 휴식 공간 제공 및 무분별한 개발 방지

82		장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원)을 신속하게 조성하여 시민의 건강, 여가 및 정서생활 함양에 이바지하고 삶의 질 향상에 기여

2. 지방채 발행계획: 200백만원

3. 추진경위

○ 1965.  6. 22. : 도시계획시설 결정

○ 2015.  3. 27. : 공원조성계획 결정

○ 2020.  6. 17. : 실시계획 작성고시

○ 2024.  6. 19. : 공원조성계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수

○ 2024. 12. 16. : 명월·대림공원 주민설명회 개최

○ 2025.  3. 17. : 교통영향평가용역 착수

○ 2025.  3. 31. : 공원조성계획 결정(변경) 및 실시설계용역 일시정지

○ 2025.  6. 23. : 환경영향평가용역 착수

○ 2025.  8. 28. : 교통영향평가용역 일시정지

○ 2025.  9. 18. : 명월·대림공원 주민설명회(2차) 개최

4. 사업개요

○ 기  간: 2024년 ~ 2027년

○ 위  치: 제주시 한림읍 명월리 2200번지 일원

○ 내  역: 명월공원 조성 1식 (A=249,291㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	1식	22,600	909	200		200				21,491
공사비	공원조성 1식	1,000		200		200				21,491
부대비	설계 등 1식	909	909

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	22,600	1식	909	1식	200	1식	21,491
공사비	공원조성 1식	21,691			1식	200	1식	21,491
부대비	설계 등 1식	909	1식	909

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	22,600	909	200	21,491
지 방 채	200	-	200	-
시 도 비	22,400	909	-	21,491

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시공원 조성을 통한 도시환경 개선 및 시민의 휴식공간 제공

○ 도심 속 시민들의 정서함양 및 휴양, 건강증진을 위한 녹지 공간 확보

83		장기미집행 도시계획시설(사라봉공원) 조성사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원)을 신속하게 조성하여 시민의 건강, 여가 및 정서생활 함양에 이바지하고 삶의 질 향상에 기여

2. 지방채 발행계획: 300백만원

3. 추진경위

○ 1962.  9. 19. : 도시계획시설(도시공원) 최초 결정

○ 2020.  6. 17. : 실시계획 작성고시

○ 2022.  9. 20. : 환경영향평가 시행

○ 2024.  1. 26. : 환경영향평가 심의완료

○ 2023. 11. 30. : 타당성조사 완료

○ 2024.  3. 19. : 지방재정 중앙투자심사 완료

4. 사업개요

○ 기  간 : 2026년 ~ 2027년

○ 위  치 : 제주시 건입동 387-1번지 일원

○ 내  역 : 사라봉공원 조성 1식 (A=979,876㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	1식	38,700		300		300				38,400
공사비	공원조성 1식	38,100								38,100
부대비	설계 등 1식	600		300		300				300

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	38,700			1식	300	1식	38,400
공사비	공원조성 1식	38,100					1식	38,100
부대비	설계 등 1식	600			1식	300	1식	300

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	38,700		300	38,400
지 방 채	300		300	-
시 도 비	38,400		-	38,400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시공원 조성을 통한 도시환경 개선 및 시민의 휴식공간 제공

○ 도심 속 시민들의 정서함양 및 휴양, 건강증진을 위한 녹지 공간 확보

84		장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원)을 신속하게 조성하여 시민의 건강, 여가 및 정서생활 함양에 이바지하고 삶의 질 향상에 기여

2. 지방채 발행계획: 200백만원

3. 추진경위

○ 1965.  6. 22. : 도시계획시설 결정

○ 2015.  7. 20. : 공원조성계획 결정

○ 2020.  6. 17. : 실시계획 작성고시

○ 2024.  6. 19. : 공원조성계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수

○ 2024.  8. 16. : 대림,김녕공원 매장유산조사(표본,시굴)용역 착수

○ 2024. 10. 10. : 대림,김녕공원 매장유산조사(표본,시굴)용역 일시정지

○ 2024. 10. 25. : 교통영향평가용역 착수

○ 2024. 11. 22. : 공원조성계획 결정(변경) 및 실시설계용역 일시정지

○ 2024. 12. 16. : 명월·대림공원 주민설명회 개최

○ 2025.  2.  7. : 교통영향평가용역 일시정지

○ 2025.  6. 23. : 환경영향평가용역 착수

○ 2025.  9. 18. : 명월·대림공원 주민설명회(2차) 개최

4. 사업개요

○ 기  간 : 2024년 ~ 2027년

○ 위  치 : 제주시 한림읍 대림리 977번지 일원

○ 내  역 : 대림공원 조성 1식 (A=190,240㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	1식	16,000	992	200		200				14,808
공사비	공원조성 1식	15,008		200		200				14,808
부대비	설계 등 1식	992	992

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	16,000	1식	992	1식	200	1식	14,808
공사비	공원조성 1식	15,008			1식	200	1식	14,808
부대비	설계 등 1식	992	1식	992

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	16,000	992	200	14,808
지 방 채	200	-	200	-
시 도 비	15,800	992	-	14,808

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시공원 조성을 통한 도시환경 개선 및 시민의 휴식공간 제공

○ 도심 속 시민들의 정서함양 및 휴양, 건강증진을 위한 녹지 공간 확보

85		장기미집행 도시계획시설(화북공원) 조성사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원)을 신속하게 조성하여 시민의 건강, 여가 및 정서생활 함양에 이바지하고 삶의 질 향상에 기여

2. 지방채 발행계획: 100백만원

3. 추진경위

○ 2001.  8. 11. : 도시계획시설 결정

○ 2015.  3. 26. : 공원조성계획 결정

○ 2020.  6. 17. : 실시계획 작성고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2026년 1월 ~ 12월

○ 위  치: 제주시 화북이동 3387번지 일원

○ 내  역: 화북공원 조성 1식 (A=10,373㎡)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	1식	280		100		100				180
공사비	공원조성 1식	230		50		50				180
부대비	설계 등 1식	50		50		50				-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	1식	280			1식	100
공사비	공원조성 1식	230			1식	50		180
부대비	설계 등 1식	50			1식	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	280		100	180
지 방 채	100		100
시 도 비	180			180

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시공원 조성을 통한 도시환경 개선 및 시민의 휴식공간 제공

○ 도심 속 시민들의 정서함양 및 휴양, 건강증진을 위한 녹지 공간 확보

86		대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 기존도로 협소로 농산물 수송과 지역주민 교통불편 해소

○ 사업의 장기화로 인한 주민 불편 해소 및 환매권 발생 예방을 위한 사업비 필요

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ 2018. 9. 21. : 지방재정 투자심사 완료

○ 2018. 11. 5. : 실시설계 용역 완료

○ 2021. 12 .29. ~ : 보상비 책정 통보 및 보상협의 추진

○ 2025. 10. 10. : 사전 지장물 등 정비공사 발주

4. 사업개요

○ 기  간: 2018 ~ 2030

○ 위  치: 제주지 조천읍 대흘리 1719-2 ~ 대흘리 553-2

○ 내  역: 농어촌도로 정비 L=2.5㎞, B=10~12m

○ 공정률

- 편입토지 보상 협의(협의율 86.5%)

- 도로 확포장 공사(공정률 5%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		9,798	1,669	2,000	-	2,000	-	-	-	6,129
공사비	농어촌도로 정비 (L=2.5km)	7,700	270	1,800	-	1,800	-	-	-	5,630
보상비	용지보상 1식	2,098	1,399	200	-	200	-	-	-	499

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		9,798		1,669		2,000		6,129
공사비	농어촌도로 정비 (L=2km)	7,700	사전 지장물 정비공사 1식	270	도로 확·포장 (L=0.5km)	1,800	도로 확·포장 (L=1.5km)	5,630
보상비	용지보상 1식	2,098	용지보상 1식	1,399	용지보상 1식	200	용지보상 1식	499

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,798	1,669	2,000	6,129
지 방 채	2,000	-	2,000	-
시 도 비	7,798	1,669	-	6,129

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주민숙원사업 해소로 신뢰받는 행정 구현 및 안전하고 괘적한 도로환경 조성

87		사장밭선 농어촌도로 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 기존도로 협소로 농산물 수송과 지역주민 교통 불편해소

○ 2017년 보상비 지급 이후 사업 장기화로 인한 환매권 추가 발생 예방

※ 환매권 발생에 따른 지장물 제거 등 공사 착공 예산 필요

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 2016. 6. 23: 실시설계 용역 완료

○ 2017. 4. 21: 도로의 노선지정 공고

○ 2017. 6. 22: 보상비 책정 통보 및 보상협의 추진

○ 2018. 5. 14: 지방재정 투사심사 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2016. ~ 2028.

○ 위  치: 제주시 조천읍 함덕리 2776-15 ~ 조천읍 함덕리 672-1번지 일원

○ 내  역: 도로확포장사업 L=2.0km, B=8m

○ 공정률: 편입토지 보상 협의 진행 중(협의율 50.4%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		5,000	1,562	500	-	500	-	-	-	2,938
공사비	농어촌도로 정비 (L=2.0km)	2,414	-	300	-	300	-	-	-	2,114
보상비	용지보상 1식	2,253	1,229	200	-	200	-	-	-	824
부대비	실시설계 1식	333	333	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		5,000		1,562		500		2,938
공사비	농어촌도로 정비 (L=2.0km)	2,414		-	사전 지장물 정비공사 1식	300	농어촌도로 정비 (L=2.0km)	2,114
보상비	용지보상 1식	2,253	용지보상 1식	1,229	용지보상 1식	200	용지보상 1식	824
부대비	실시설계 1식	333	실시설계 1식	333		-		-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	5,000	1,562	500	2,938
지 방 채	500	-	500	-
시 도 비	4,500	1,562	-	2,938

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주민숙원사업 해소로 신뢰받는 행정 구현 및 안전하고 괘적한 도로환경 조성

○ 사업 장기화로 인한 환매권 추가 발생 예방 등 예산 사용의 효율화

88		군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도로 폭 협소로 인한 통행불편 해소 및 쾌적한 도로환경 조성 필요

○ 지역주민 오랜 숙원사업 해결 및 행정 신뢰 향상

※ 환매권 발생에 따른 지장물 제거 등 공사 착공 예산 필요

2. 지방채 발행계획: 300백만원

3. 추진경위

○ 2018. 9. 21. : 지방재정 투자심사 완료

○ 2018. 11. 8. : 실시설계 용역 완료

○ 2021. 11. 22. ~ : 보상비 책정 및 보상협의 추진

4. 사업개요

○ 기  간: 2018 ~ 2030

○ 위  치: 제주시 구좌읍 월정리 990-9 ~ 행원리 3272-2

○ 내  역: 농어촌도로 정비 L=3.5㎞, B=12m

○ 공정률: 편입토지 보상 협의 진행 중(협의율 57.2%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		10,490	1,703	300	-	-	300	-	-	8,487
공사비	도로 확·포장 (L=3.5km)	7,970	-	300	-	-	300	-	-	7,670
보상비	용지보상 1식	2,320	1,503	-	-	-	-	-	-	817
부대비	실시설계 1식	200	200	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		10,490		1.703		300		8,487
공사비	도로 확·포장 (L=3.5km)	7,970		-	사전 지장물 등 정비공사 1식	300	도로 확·포장 (L=3.5km)	7,670
보상비	용지보상 1식	2,320	용지보상 1식	1,503		-	용지보상 1식	817
부대비	실시설계 1식	200	실시설계 1식	200		-		-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	10,490	1,730	300	8,487
지 방 채	300	-	300	-
시 도 비	10,190	1,730	-	8,487

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주민숙원사업 해소로 신뢰받는 행정 구현 및 안전하고 괘적한 도로환경 조성

○ 환매권 발생(5년 경과) 예정 사업으로 일부 공사 사전 집행을 통한 환매권 발생 최소화

89		송당선 농어촌도로 정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 기존도로 협소로 농산물 수송과 지역주민 교통 불편해소

○ 2021년 보상비 지급 이후 사업 장기화로 인한 환매권 추가 발생 예방

※ 환매권 발생에 따른 지장물 제거 등 공사 착공 예산 필요

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 2018. 07. 실시설계 용역 완료

○ 2018. 12. 소규모 환경영향평가 용역 완료

○ 2021. 08. 보상계획 열람 및 사업인정에 관한 주민등의 의견청취

○ 2021. 09. 도로노선의 지정 공고

○ 2021. 11. 보상비 책정 통보 및 보상 협의 추진

○ 2024. 12. 소규모 재해영향평가 용역 완료

○ 2025. 05. 지반조사 용역완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2021. ~ 2030.

○ 위  치: 제주시 구좌읍 송당리 637-7 ~ 구좌읍 송당리 933번지 일원

○ 내  역: 도로확포장사업 L=1.5km, B=10m

○ 공정률: 편입토지 보상 협의 진행 중(협의율 93.6%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		4,620	1,306	500		500				2,814
공사비	농어촌도로 정비 (L=1.5km)	3,214	-	400		400				2,814
보상비	용지보상 1식	1,206	1,106	100		100
부대비	실시설계 1식	200	200

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		4,620		1,306		500		2,814
공사비	농어촌도로 정비 (L=1.5km)	3,214			사전 지장물 정비공사 1식	400	농어촌도로 정비 (L=1.5km)	2,814
보상비	용지보상 1식	1,206	용지보상 1식	1,106	용지보상 1식	100
부대비	실시설계 1식	200	실시설계 1식	200

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,620
지 방 채	500	-	500	-
시 도 비	4,120	1,306	-	2,814

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주민숙원사업 해소로 신뢰받는 행정 구현 및 안전하고 괘적한 도로환경 조성

○ 사업 장기화로 인한 환매권 추가 발생 예방 등 예산 사용의 효율화

90		시도40호선(광성로~애조로)확·포장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○  道 건설과에서 추진 중인 광령~도평 우회도로 건설공사와 병행한 사업으로 출·퇴근시간 교통량 분산 및 도로 폭 협소로 인한 지역주민 교통 불편 해소

※ 애월읍 광령리 일원 남북 통행 도로 필요

2. 지방채 발행계획: 1,000백만원

3. 추진경위

○ 2021. 12. 08. : 시도 건설·관리계획 반영

○ 2025. 06. 20. : 실시설계용역 완료

○ 2025. 08. 08. : 소규모 환경 재해영향평가 완료

○ 2025. 09. 26. : 지방재정 투자심사 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2025 ~ 2030

○ 위  치: 제주시 애월읍 광령리 1714 ~ 광령리 2195-3

○ 내  역: 도로 확·포장 L=1.08㎞, B=12m

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		8,450	100	1,000	-	1,000	-	-	-	7,350
공사비	도로 확·포장 (L=1.08km)	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000
보상비	용지보상 1식	4,400	50	1,000	-	1,000	-	-	-	3,350
부대비	실시설계 1식	50	50	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		8,450		100		1,000		7,350
공사비	도로 확·포장 (L=1.08km)	4,000		-		-		4,000
보상비	용지보상 1식	4,400	용지보상 1식	50	용지보상 1식	1,000	용지보상 1식	3,350
부대비	실시설계 1식	50	실시설계 1식	50		-		-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	8,450	100	1,000	7,350
지 방 채	1,000	-	1,000	-
시 도 비	7,450	100	-	7,350

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주민숙원사업 해소로 신뢰받는 행정 구현 및 안전하고 괘적한 도로환경 조성

○ 애월읍 광령리 일원 남북도로 개설은 통한 교통 분산 등 교통량 해소

91		우도면 직원관사 신축공사

1. 사업목적 또는 필요성

○ 현재 정원(정원 22명, 현원 23명) 대비 관사 보유 수가 절대적으로 부족(6개실 부족)하여, 매년 약 4천만원 가량의 관사 임차 예산이 반복 지출.

○ 기존 관사 시설 노후화로 인해 잦은 보수와 휴게시설 부족 문제가 지속됨에 따라, 신규 관사 신축을 통해 유지관리 효율성 제고 및 안정적인 행정 인력 배치 기반을 마련하여 도서지역 공공서비스 향상과 직원 사기 진작을 위한 직원 상주 여건을 개선하고자 함.

2. 지방채 발행계획: 3,600백만원

3. 추진경위

○ 2023년 읍면동 종합감사 지적(2023.11월)

- 관사 사용 수요에 맞게 부족한 관사 시설 확충 방안 강구 필요

- 현재 정원 23명 중 관사 거주 17명, 펜션 거주 4명(단순 임차), 우도 자가 거주 2명

○ 우도면 직원관사 신축계획 부지 협의

○ 우도면 직원관사 신축 공공건축가 자문: 2025. 7.

○ 지방재정투자사업 심사의뢰서 제출: 2025. 7.

○ 2025년 제6회 공유재산심의회 심의 결과 가결: 2025. 9. 24.

○ 2025년 정기 제3차 지방재정계획심의회: 2025. 9. 26.

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. ~ 2027. 12.

○ 위  치: 제주시 우도면 연평리 1407-2

○ 내  역: 건물 신축 1동(지상 3층, 23호실, 연면적 1,554㎡)

< 사업총괄 >                                                  (단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,950		3,924		3,600	324			3,026
공사비	1,554㎡	6,540	-	3,530		3,530				3,010
설계비	1식	324	-	324			324			-
감리비	1식	68	-	60		60				8
시설 부대비	1식	18	-	10		10				8

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		6,950	-	-		3,924		3,026
공사비	1,554㎡	6,540	-	-	지상1,2층	3,530	3층, 주차장 등	3,010
설계비	1식	324	-	-	1식	324		-
감리비	1식	68	-	-	1식	60		8
시설 부대비	1식	18	-	-	1식	10		8

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,950	-	3,924	3,026
국 비		-	-	-
지 방 채	3,600	-	3,600	-
시 도 비	3,350	-	324	3,026

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 안정적인 숙소 제공으로 주거복지 향상 및 근무 만족도 제고

○ 임차·보수 예산 절감과 주거환경 개선을 통한 인력 확보 및 조직 안정성 강화

92		농촌중심지활성화사업(남원읍)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 농림축산식품부 농촌협약 공모 선정에 따라 5개년(2025~2029년)간 추진되는 사업으로, 중심지 거점시설 조성을 위한 농촌중심지활성화사업 연차별 추진

○ 남원읍 주민들의 생활서비스 욕구를 충족시키고, 거점지 및 배후마을 주민들이 체감할 수 있는 시설 조성을 통해 지역 주민의 삶의 질과 정주만족도 제고

2. 지방채 발행계획: 2,700백만원

3. 추진경위

○ 공모사업 지방재정계획심의위원회 심의(적정): 2024. 4. 9.

○ 농촌협약 공모 신청(농식품부): 2024. 4. 26.

○ 농촌협약 공모선정에 따른 농촌중심지활성화사업 확정: 2024. 6. 4.

○ 공기관대행심의(적정) / 공기관대행 의회보고: 2024.9.3. / 10.22.

- 대행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

○ 공유재산심의(가결) / 공유재산관리계획안 의회심의(가결): 2024.10.17. / 11.20.

- 심의안건: (가칭)모두의 아지트 신축, 14,759백만원

○ 공기관대행 위수탁계약 체결(서귀포시↔한국농어촌공사): 2025. 2. 26.

○ 농촌협약 체결(서귀포시↔농식품부): 2025. 5. 15.

○ 농촌중심지활성화사업 기본계획 수립: 2025. 7.~2026. 6.

4. 사업개요

○ 기  간: 2025. 1월~2029. 12월

○ 위  치: 서귀포시 남원읍

- 거점시설: 구.남원농협(남원리 106-1)

○ 내  역

- (가칭)모두의 아지트 신축: 연면적 1,256㎡, 지상 2층

- 부지매입(구.남원농협): 대지면적 2,561㎡

- 기본계획 수립, 실시설계 용역, 감리비 등

○ 공정률: 기본계획 수립 중

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		14,759	1,971	5,500	2,730	2,700	70	-	-	7,288
보상비	토지 1필지 (2,561㎡)	6,400	1,671	4,729	2,190	2,500	39	-	-	-
공사비	연면적 1,256㎡	6,970	-	-	-	-	-	-	-	6,970
부대비	1식	1,389	300	771	540	200	31	-		318

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		14,759		1,971		5,500		7,288
보상비	토지 1필지 (2,561㎡)	6,400	토지 1필지 (2,561㎡)	1,671	토지 1필지 (2,561㎡)	4,729	-	-
공사비	연면적 1,256㎡	6,970	-	-			연면적 1,256㎡	6,970
부대비	1식	1,389	기본계획 수립 등	300	세부 설계비 등	771	감리비 등	318

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	14,759	1,971	5,500	7,288
국 비	9,211	1,380	2,730	5,101
지 방 채	2,700	-	2,700	-
시 도 비	2,848	591	70	2,187

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 문화‧체육‧복지 수요를 충족시킬 수 있는 공간 확보로, 중심지 기능을 강화하며 주민들에게 원스톱 서비스 편의를 제공

○ 거점시설 조성을 통한 주민수요에 맞춘 다양한 프로그램 운영으로, 지역주민 문화 향유 기회 확대 및 주민공동체 활성화 기반 마련

93		서귀포시 종합체육관 건립사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 2026년 제주도 서귀포 전국체육대회 성공적 개최 및 체전 시 실내종목을 위한 경기장으로 활용하고, 향후 전국 규모의 전문 실내체육 경기 및 전지훈련장으로 활용하여 지역주민 건강증진 및 지역경제 활성화에 이바지

2. 지방채 발행계획: 12,000백만원

3. 추진경위

○ 기본설계 완료: '24. 10. 23.

○ 우선시공(올림픽체육관 건물철거 및 토목)공사 추진: '24. 11. ~ '25. 4.

○ 실시설계 완료: '25. 3. 4.

○ 가격협상 및 본공사 계약: '25. 3. 27.

○ 본공사 착공: '25. 4. 3.

○ 현재 공사 진행상황: 골조공사 중 – 공정률 26%('25. 9월말 기준)

4. 사업개요

○ 기  간: 2024년 1월 ~ 2026년 12월(전국체전 일정 고려해 '26. 10월까지 준공)

○ 위  치: 서귀포시 강정동 1480번지 일원(강창학 체육공원 내)

○ 내  역: 종합체육관 건립 1동 (지상3층, 연면적 8,954㎡)

○ 공정률: 26%('25. 9월말 기준)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		49,950	33,400	16,400	4,400	12,000		-	-	-
공사비	체육관 건립 1식	48,250	32,100	16,150	4,400	11,750	-	-	-	-
감리비	감리용역 1식	1,550	1,300	250	-	250	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		49,950		33,400		16,400
공사비	체육관 건립 1식	48,250	체육관 건립 1식	32,100	체육관 건립 1식	16,150	-	-
감리비	감리용역 1식	1,550	감리용역 1식	1,300	감리용역 1식	250	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	49,950	33,400	16,400	-
국 비	14,400	10,000	4,400	-
지 방 채	12,000	-	12,000	-
시 도 비	23,400	23,400	-	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 2026년 성공적인 전국체전 개최 및 서귀포시를 전지훈련 중심지로 만듦과 동시에 차별화된 시설로 전지훈련 유치 확대

94		서귀포 반다비 체육센터 건립

1. 사업목적 또는 필요성

○ 반다비 체육센터의 수중 시설 추가 확충으로 수중 운동(수중 걷기 등)이 필요한 장애인 및 시민들의 복지 향상 추진

○ 반다비 체육센터(수중운동실 포함) 건립으로 언제나 편리하게 이용가능한 생활밀착형 시설 조성

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 생활밀착형 국민체육센터 공모사업 선정(문체부): ’22. 4월

○ 반다비 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 완료: ’23. 8월

○ 반다비 체육센터 건립사업 착공: ’23. 12월

○ 반다비 체육센터 수중운동실 사전 협의 추진: ’25. 1월 ~ 4월

- 서귀포시장애인체육회 반다비 체육센터 수중운동실 건립 제안요청: ’25. 1월 ~ 4월

- 수중운동실 건립 예산부서 사전 협의 완료(도 예산담당관): ’25. 2월

○ 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 2차(수중운동실) 공모사업 신청(문체부): ’25. 2월

○ 반다비 체육센터 건립사업 준공: ’25. 3월

○ 국민체육센터 건립 지원사업 변경계획 제출(문체부): ’25. 4월

○ 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업 국비 추가예산(확정내시) 통보: ’25. 7월

○ 공유재산 심의 완료(가결): ’25. 8월

- 공유재산 관리계획 심의 (안건 제출: ’25. 7. 24. / 심의: ’25. 8. 14.)

○ 반다비 체육센터 수중운동실 건립 실시설계용역 착공: ’25. 10월

- 본관 체육센터 건립 완료, 수중운동실 별관 실시설계 중

4. 사업개요

○ 기    간: 2022년 1월 ~ 2026년 12월

○ 총사업비: 87억원

○ 위    치: 서귀포시 남원읍 신례리 334번지(공천포전지훈련센터)

○ 내    역: 서귀포 반다비 체육센터 수중운동실 추가 건립 1식

○ 공 정 률: 80%('25. 9월말 기준)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		8,700	7,400	1,300	800	500	0	0	0	-
공사비	반다비 체육센터 건립 1식 수중운동실 별관 건립 1식	6,490	5,250	1,240	775	465	-	-	-	-
감리비	감리1식	450	400	50	25	25	-	-	-	-
자산 취득비	자산취득 1식	1,750	1,750	-	-	-	-	-	-	-
부대비	시설부대비 1식	10	-	10	-	10	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		8,700		7,400		1,300
공사비	반다비 체육센터 건립 1식 수중운동실 별관 1식	6,490	반다비 체육센터 1식	5,250	반다비 체육센터 1식 수중운동실 설계 1식	1,240	-	-
감리비	감리1식	450	감리1식	400	-	50	-	-
자산 취득비	자산취득 1식	1,750	-	1,750	자산취득 1식	-	-	-
부대비	시설부대비 1식	10	-	-	-	10	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	8,700	7,400	1,300	-
국 비	4,000	3,200	800	-
지 방 채	500	-	500	-
시 도 비	4,200	4,200	-	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 서귀포시 반다비 체육센터와 연계한 수중운동실 건립으로 장애인, 노인 등의 건강은 물론 서귀포시 유일의 장애인 생활체육시설 환경 구축에 크게 기여

95		이중섭미술관 시설확충사업

1. 사업의 필요성

○ 관람객 수용능력 한계와 편의시설 부족 등 문제점 대두

○ 랜드마크 역할로서 문화예술 및 원도심 활성화에 기여

2. 지방채 발행계획: 15,700백만원

3. 추진경위

○ 이중섭미술관 시설확충사업 설계 공모: '23. 4월 ~ 8월

○ 시설확충사업 기본 및 실시설계 용역: '23. 8월 ~ '25. 4월

○ 각종 용역(소규모 지하안전영향평가 용역 등) 시행: '24. 2월 ~ 12월

○ 기존 이중섭미술관 철거: '24. 12월

○ 시설확충사업 공사 계약 및 착공: '25. 4월

○ 터파기 공사준비 및 정방동주민센터 서측 옹벽 보강 공사: '25. 4월 ~ 8월

○ 흙막이‧터파기공사*'25. 8월~'26. 2월, 골조‧마감공사*~'27. 4월, '27. 6월 재개관 예정

4. 사업개요

○ 기  간: ’19. 9월 ~ ’27. 4월 *공사기간: ’25. 4월 ~ ’27. 4월

○ 위  치: 기존 이중섭미술관 부지

○ 내  역: 이중섭미술관 신축 1동(연면적 5,982㎡, 지하1층·지상2층)

○ 사업비: 368억원(공사 296, 설계‧감리비 등 39, 보상 33)

○ 공정률: 8%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		36,800	10,000	20,500	-	15,700	4,800	-	-	6,300
공사비	미술관 건립 1식	29,600	4,600	19,100	-	15,700	3,400	-	-	5,900
감리비	건설사업관리 및 전기감리 1식	1,700	500	800	-		800	-	-	400
부대비	보상 및 각종 용역 등 1식	5,500	4,900	600	-		600	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                      (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		36,800		10,000		20,500		6,300
공사비	미술관 건립 1식	29,600	공사비 1식	4,600	건축공사 등 1식	19,100	전기․통신․소방공사 1식	5,900
감리비	건설사업관리 및 전기감리 1식	1,700	감리비 1식	500	전기감리용역 1식	800	전기감리용역 1식	400
부대비	보상 및 각종 용역 등 1식	5,500	각종 용역 및 수수료 등 1식	4,900	각종 용역 및 수수료 등 1식	600

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	36,800	10,000	20,500	6,300
국 비
지 방 채	15,700		15,700
시 도 비	21,100	10,000	4,800	6,300

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 랜드마크 역할에 걸맞은 이중섭미술관 시설확충사업을 정상적으로 추진하여 문화예술 및 원도심 활성화에 기여

96		농업용수 수리시설개보수(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 노후화된 농업용 수리시설(관로, 배수조 등) 보수·보강을 통해 안정적인 농업용수 공급 기반을 구축하고, 가뭄·폭염 등 이상기후에 대응한 농업용수 관리체계 개선으로 지속가능한 영농활동 도모.

○ 마을 및 수리계 등 농업용수 수리시설 개보수 관련 민원 상시 접수됨에 따라 사업 신속 진행하여 민원 불편 최소화 도모.

2. 지방채 발행계획: 5,000백만원

3. 추진경위

○ `23. 9월 : 투자심사 완료

○ `23. 1 ~ 12월: 관로 및 배수조 정비공사 시행 (L=8km, 배수조 1개소)

○ `24. 1 ~ 12월: 관로 정비공사 시행 (L=12.7㎞)

○ `25. 1 ~ 12월: 관로 및 배수조 정비공사 시행 (L=12km, 배수조 1개소)

○ `25. 8 ~ 9월: 26년 예산안 제출 및 중기지방재정 계획 수립

○ `25. 10월: 26년 사업대상지 확정 및 실시설계 용역 추진 (12월까지)

4. 사업개요

○ 기  간: 2026년

○ 위  치: 서귀포시 관내

○ 내  역: 농업용수관로 정비 L=9km 및 배수조(200톤) 4개소 증설

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
농업용수 수리시설개보수	관로 정비 9km 및 배수조(200톤) 4개소 증설	14,500	4,500	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
농업용수 수리시설개보수	관로 21km 정비 및 배수조 5개소 증설	14,500	관로 12km 정비 및 배수조 1개소 증설	4,500	관로 9km 정비 및 배수조 4개소 증설	5,000	관로 및 배수조 정비 1식	5,000

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	14,500	4,500	5,000	5,000
국 비	-	-	-	-
지 방 채	5,000	-	5,000	-
시 도 비	9,500	4,500	-	5,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 서귀포시 관내 414개 관정 농업용수관로 정비로 유수율 제고 및 안정적인 농업용수 공급 및 영농 불편 민원 해소

97		농업용수 통합관리사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 지속적 가뭄·폭염 등 이상기후 대비한 농업용 수리시설 정비 및 농업용수 공급·관리체계 개선으로 안정적인 영농활동 도모

○ 다수의 수리계를 마을 단위로 통합함으로써 수리시설의 효율적인 관리 및 이용을 도모하고 농업용수 광역화사업과 연계하여 안정적인 영농기반 구축

2. 지방채 발행계획: 5,000백만원

3. 추진경위

○ `19. ~ `24년: 농업용수 수리계 마을 단위 통합관리 사업 추진

- `19. : 5개년(`19. ~ `23.) 로드맵 추진계획 수립 및 관로정비 공사 시범사업(15억) 추진

- `19. ~ `24. : 마을 단위 수리계 통합 시행 (`19) 311개→ (`24) 243개 수리계로 통합

○ 농업용수 통합마을 관로 정비공사 시행(143억 원): `19 ~ `25

- 2019년 통합마을 관로 정비공사 시범사업 추진 (15억 원)

- 2020년 농업용수 수리계 마을단위 통합지역 관로정비 사업 (15억 원)

- 2021~2025년 농업용수 통합관리 사업 추진 (113억 원)

○ `25. 8 ~ 9월: 26년 예산안 및 중기지방재정 계획 수립

○ `25. 10월: 사업대상지 확정 및 실시설계 용역 추진 (12월까지)

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1 ~ 12월

○ 위  치: 서귀포시 관내

○ 내  역: 농업용수관로 정비 L=14km

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
농업용수 통합관리사업	14km	13,500	3,500	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
농업용수 통합관리사업	관로 22km	13,500	관로 8km	3,500	관로 14km	5,000	관로 14km	5,000

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	13,500	3,500	5,000	5,000
국 비	-	-	-	-
지 방 채	5,000	-	5,000	-
시 도 비	8,500	3,500	-	5,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도 광역화사업 연계한 농업용수관로 정비 공사 진행으로 농업용수 공급망 확대 기반 마련 및 안정적인 농업용수 공급 가능

98		신도항 어촌신활력 증진사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 어촌신활력증진사업은 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력을 도모하는 사업으로,

○ 체계적인 사업 발굴 및 관리를 위해 사업수행 경험과 어촌종합개발 전반에 대한 전문적인 지식을 갖추고 있는 전문 공공기관에 위탁하여 사업의 안전성 및 효율성을 도모할 필요성이 있음.

2. 지방채 발행계획: 800백만원

3. 추진경위

○ 중기재정계획: 2025. 9월

○ 투자심사: 2024. 4월

○ 민간위탁·공기관대행: 2024. 4월

○ 2024년도 어촌신활력증진사업(유형3) 공모 신청 : 2023년 9월

○ 서면평가 및 현장평가 수행: 2023년 11월

○ 어촌신활력증진사업 공모 선정: 2024년 1월

○ 사업 위·수탁계약 체결: 2024년 7월

○ 기본계획 수립 및 고시: 2025년 3월

○ 시행계획 수립 및 사업 추진 : 2025년 4월 ~ 2026년 12월

4. 사업개요

○ 기  간: 2024. 1. ~ 2026. 12.

○ 위  치: 서귀포시 대정읍 신도리 신도항 일원

○ 사업량: 어촌신활력증진사업 1식

○ 공정률: 30%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		4,950	2230	2,720	1,904	800	16
공사비	1식	4,000	1,280	2,720	1,904	800	16
감리비	1식	500	500
부대비	1식	450	450

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계	4,950	기투자	2,230	금회계획	2,720	금후계획	-
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		4,950		2,230		2,720
공사비	외곽시설 및 기타 어항시설 개선	4,000	외곽시설 및 기타 어항시설 개선	1,280	외곽시설 및 기타 어항시설 개선	2,720
감리비	1식	500	1식	500
부대비	기본 및 실시설계 용역	450	기본 및 실시설계 용역	450

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,950	2,230	2,720
국 비	3,465	1,561	1,904
지 방 채	800		800
시 도 비	685	669	16

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 정부정책에 대한 홍보와 마을별 사업 참여 확대에 따른 지역역량강화

○ 사업대상지 선정에 따른 50억원 규모의 마을 개발사업 지원

99		토산항 어촌신활력 증진사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 어촌신활력증진사업은 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력을 도모하는 사업으로,

○ 체계적인 사업 발굴 및 관리를 위해 사업수행 경험과 어촌종합개발 전반에 대한 전문적인 지식을 갖추고 있는 전문 공공기관에 위탁하여 사업의 안전성 및 효율성을 도모할 필요성이 있음.

2. 지방채 발행계획: 400백만원

3. 추진경위

○ 중기재정계획: 2025. 9월

○ 투자심사: 2025. 3월

○ 민간위탁·공기관대행: 2025. 4월

○ 2025년도 어촌신활력증진사업(유형3) 공모 신청 : 2024년 10월

○ 서면평가 및 현장평가 수행: 2024년 12월

○ 어촌신활력증진사업 공모 선정: 2025년 2월

○ 사업 위·수탁계약 체결: 2025년 8월

○ 기본계획 수립 및 고시: 2025년 12월

○ 시행계획 수립 및 사업 추진 : 2026년 1월 ~ 2027년 12월

4. 사업개요

○ 기  간: 2025. 1. ~ 2027. 12.

○ 위  치: 서귀포시 대정읍 신도리 토산항 일원

○ 사업량: 어촌신활력증진사업 1식

○ 공정률: 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		4,952	750	1,480	1,036	400	44			2,722
공사비	1식	3,702		1,280	896	384				2,422
감리비	1식	500		200	140	16	44			300
부대비	1식	750	750							-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		4,952		750		1,480		2,722
공사비	외곽시설 및 기타 어항시설 개선	3,702	외곽시설 및 기타 어항시설 개선	-	외곽시설 및 기타 어항시설 개선	1,280	외곽시설 및 기타 어항시설 개선	2,422
감리비	1식	500	1식	-	1식	200	1식	300
부대비	기본 및 실시설계 용역	750	기본 및 실시설계 용역	750	기본 및 실시설계 용역	-	기본 및 실시설계 용역	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,952	750	1,480	2,722
국 비	3,466	525	1,036	1,905
지 방 채	400	-	400	-
시 도 비	1,086	225	44	817

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 정부정책에 대한 홍보와 마을별 사업 참여 확대에 따른 지역역량강화

○ 사업대상지 선정에 따른 50억원 규모의 마을 개발사업 지원

100		오조리 행복한 삶터 조성

1. 사업목적 또는 필요성

○ 어촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고. 어촌의 계획적인 개발을 통해 어촌의 인군유지 및 지역별 특화발전 도모

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 중기재정계획: 2025. 9월

○ 민간위탁·공기관대행: 2024. 9월

○ 2025년도 신규 공모 신청: 2024. 4. 8.

○ 道(도) 1차 발표 평가: 2024. 4. 25.

○ 해수부 2차 발표 및 현장 평가: 2024. 5. 21.

○ 최종 공모 선정 발표: 2024. 5. 30.

○ 기본계획 수립 착수 및 해수부 심의: 2025. 11.

○ 연차별 사업추진: 2026. ~ 2029.

4. 사업개요

○ 기  간: 2025. 1. ~ 2029. 12.

○ 위  치: 서귀포시 성산읍 오조리 일원

○ 사업량: 행복한 삶터 조성 사업 1식

○ 공정률: 20%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		7,863	932	1,740	1,218	500	22			5,191
공사비	1식	6,363	-	1,360	952	408				5,003
감리비	1식	530	162	180	126	54				188
부대비	1식	970	770	200	140	38	22			-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		7,863		932		1,740		5,191
공사비	기초생활기반시설확충	6,363	기초생활기반시설확충	-	기초생활기반시설확충	1,360	기초생활기반시설확충	5,003
감리비	1식	530	1식	162	1식	180	1식	188
부대비	기본 및 실시설계 용역	970	기본 및 실시설계 용역	770	기본 및 실시설계 용역	200	기본 및 실시설계 용역	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,863	932	1,740	5,191
국 비	5,504	652	1,218	3,634
지 방 채	500		500
시 도 비	1,859	280	22	1,557

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 주민 공동체 활성화를 통한 삶의 질 및 생활 만족도 향상

○ 편의·휴게공간 마련을 통한 인구유입 및 인구유출 억제 기대

○ 배후마을과 네트워크 구축을 통한 성산읍 전체의 문화 혜택 효과 상승

○ 역량 강화 사업을 통한 지역 결속력 및 자긍심 고취로 애향심 제고

○ 농수산 외 소득원을 개발하고 산업기반 재정비를 통하여 마을 소득 확대와 일자리 창출 및 귀어·귀향인 유도 등

101		환경복지관리지원센터 조성사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ (근로자의 안전과 복지 보장) 시청 제2청사 지하 임시 휴게실 운영중, 채광·환기 등 근무환경 열악하여 개선 필요

○ (지정 차고지 부재) 강창학구장 임시차고지 운영 중, '26년 전국체전 대비 체육관 신축 등 주차장 사용 불가로 청소차량 운영 어려움

*법적근거:「산업안전보건법」제128조의 2(휴게시설의 설치)

-  근로자의 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 함

「제주특별자치도 차고지증명 및 관리 조례」제3조(차고지 증명 대상 자동차)

- 대형차의 경우 2007.1. 31. 이후 등록차량에 대해서 차고지 증명 대상

2. 지방채 발행계획: 5,000백만원

3. 추진경위

○ 환경미화원 임시 대체휴게실(제2청사) 리모델링 및 입주: '24. 5월

○ 환경복지관리지원센터 설치 후보지(2개소) 감정평가 완료: '24. 11. 20.

○ 환경복지관리지원센터 조성사업 계획 수립: '24. 12. 9.

○ 연두방문 시 도민과의 대화 건의: '25. 2. 14.

○ 공유재산심의 및 지방재정투자심사 원안 가결: '25. 3. 20.

○ 공유재산관리계획(안) 원안 가결: '25. 4. 24.

※ 행정자치위원회 도의원 현장방문 '25. 4. 14.

○ 사업예정지 경계측량 및 분할측량: '25. 6. 5.

○ 토지주 사업부지 매입 협의: '25. 8. 5./ 8. 19.

4. 사업개요

○ 기  간: 2026. 1. ~ 2027. 12. 31.

○ 위  치: 서귀포시 토평동 980-3번지 외 2필지(6,671㎡, 2,021평)

○ 내  역: 4,000㎡ 이상 주차장 조성, 연면적 750㎡(3층) 이상 건축물

○ 공정률: 0%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		7,710		5,000		5,000				2,710
시설비	1식	7,393	-	4,770	-	4,770	-	-		2,623
감리비	1식	317	-	230	-	230	-	-		87

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		7,710				5,000		2,710
공사비	토지매입(6,671㎡) 주차장조성4,000㎡ 연면적 750㎡	7,393	-	-	토지매입비 공사비	4,770	공사비	2,623
감리비	설계비 감리비	317	-	-	설계비 감리비	230	감리비	87

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,710		5,000	2,710
국 비	-	-	-	-
지 방 채	7,710	-	5,000	2,710
시 도 비	-	-	-	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 청소행정인력 편의시설 제공에 따른 근무환경 개선 및 만족도 증가

○ 고정적인 차고지 확보에 따른 체계적인 차량 운용관리 및 효율성 증가

○ 복지 및 효율성 증가에 따른 질 높은 환경미화서비스 제공

102		삼매봉공원 도시생태축 복원사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도심지역 내 단절·훼손된 생태축을 연결·복원하여 생물서식환경 개선 및 생물다양성 증진

○ 도시열섬‧미세먼지 등 도시 환경문제의 대응노력을 향상하고 지역주민들의 생태체험공간 활용으로 질 높은 생태계 서비스 향상

※ 사업시행 근거: 「자연환경보전법」제43조의2

2. 지방채 발행계획: 800백만원

3. 추진경위

○ ‘23년 도시생태축 복원사업 선정 결과 통보(환경부): ‘22. 6. 20.

○ 기본 및 실시설계 용역: '23. 6. 19. ~ '24. 6. 17.

○ 복원사업 기본계획 승인 알림(영산강유역환경청→서귀포시): ’24. 3. 27.

○ 복원사업 계획 및 삼매봉공원 조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시: ‘24. 4. 5.

○ 복원사업 계약심사 및 일상감사 요청: ’24. 5. 29.

○ 복원사업(장기계속, 1차분) 추진: ‘24. 7. 1. ~ ‘25. 1. 26.

○ 복원사업(장기계속, 2차분) 추진: ‘25. 3. 19. ~ 6. 23.

4. 사업개요

○ 기  간: 2023년 ~ 2026년(4개 년)

○ 총사업비: 60억 원(국비 70%, 도비 30%)

- 환경부 도시생태축 복원사업 가이드라인에 따라 사후관리 예산 별도 반영 필요(5년간)

○ 위  치: 서귀포시 서홍동 770번지 일대

○ 내  역: 생태축 복원 및 생태교육 공간 조성(A=96,920㎡)

- 감귤원 및 노후시설물(9동) 철거, 자생종 활용 복원숲 조성, 생태학습장, 전망대, 생물서식공간 조성

○ 공정률: 65%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,500	3,176	2,824	1,977	800	47	-	-	500
공사비	도시생태축 복원	5,957	3,133	2,824	1,977	800	47	-	-	500
감리비	생태감리 용역	543	543	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		6,500		3,176		2,824		500
공사비	도시생태축 복원	5,957	도시생태축 복원	3,133	-	2,824	사후관리	500
감리비	생태감리 및 모니터링	543	생태감리 용역 1식	43	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,500	3,176	2,824	500
국 비	4,200	2,223	1,977	-
지 방 채	800	-	800	-
시 도 비	1,500	953	47	500

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 공원 내 경작지, 도로 등으로 파편화된 녹지를 복원하여 생물서식환경 개선을 통해 생태계 연결성을 강화하고 자생·고유종의 재정착 유도

○ 도시지역의 훼손된 생태계의 복원을 통해 도시생태계 기능 향상으로 기후변화 대응

103		재해위험개선지구 정비사업(서귀포시)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 태풍 및 집중호우 시 침수 피해 등 재해발생 우려가 있는 지역을 체계적으로 정비·관리하여 재해를 사전에 예방하고 주민의 생명과 재산 보호

2. 지방채 발행계획: 4,200백만원

3. 추진경위

○ '18. 3 : 1개 지구(서성로) 실시설계 용역 착수

○ '19. 7 : 1개 지구(서성로) 재해위험개선지구 지정·고시

○ '20. 3 : 1개 지구(오조) 실시설계 용역 착수

○ '21. 6 : 1개 지구(신효) 재해위험개선지구 지정·고시

○ '21. 9 : 1개 지구(서성로) 재해위험개선지구(변경) 지정·고시

○ '22. 4 : 1개 지구(신효) 실시설계 용역 착수

○ '22. 6∼8 : 2개 지구(오조, 서성로) 장기계속공사 착공

○ '23. 4 : 2개 지구(신도2, 의귀1) 재해위험개선지구 지정·고시

○ '23. 6 : 2개 지구(신흥, 태흥2) 실시설계 용역 착수

○ '24. 5 : 1개 지구(신효) 재해위험개선지구(변경) 지정·고시

○ '25. 5 : 1개 지구(상하모) 실시설계 용역 착수

○ '25. 7 :  2개 지구(신흥, 태흥2) 장기계속공사 착공

4. 사업개요

○ 기  간: 2018년 ~ 2028년(10개년)

○ 위  치: 서귀포시 일원

○ 내  역: 8개 지구(배수로 및 하천 27.88㎞, 저류지 9개소 등)

○ 공정률: 40%

① 서성로 : 저류지 3개소 배수로 6.23㎞

② 오조 : 배수펌프장 개량 1개소, 배수로 1.4㎞

③ 신효 : 저류지 2개소, 배수로 5.98㎞

④ 신흥 : 저류지 1개소, 배수로 1.54㎞

⑤ 태흥2 : 저류지 2개소, 배수로 2.21㎞

⑥ 신도2 : 소하천 7.1㎞, 소규모 펌프장 2개소

⑦ 상하모 : 저류지 1개소, 배수로 1.82㎞

⑧ 의귀1 : 배수로 1.6㎞

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		168,068	77,362	8,499	4,249.5	4,200	49.5	-	-	82,207
보상비	1식	46,327	30,982	4,000	2,000	2,000		-	-	11,345
공사비	27.88㎞	120,656	45,967	4,280	2,140	2,140	-	-	-	70,409
부대비	1식	1,085	413	219	109.5	60	49.5	-	-	453

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		향후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		168,068		77,362		8,499		82,207
보상비	1식	46,327	1식	30,982	1식	4,000	1식	11,345
공사비	27.88㎞	120,656	10.7㎞	45,967	0.99㎞	4,280	16.19㎞	70,409
부대비	1식	1,085	측량 등	413	측량 등	219	측량 등	453

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	향후계획	비 고
계	168,068	77,362	8,499	82,207
국 비	84,034	38,681	4,249.5	41,103.5
지 방 채	21,700	17,500	4,200	-
시 도 비	62,334	21,181	49.5	41,103.5

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 재해위험요인을 근원적으로 해소하여 주민의 생명과 재산보호

104		수산2 풍수해 생활권 종합정비사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 태풍 및 집중호우 시 농경지, 통행도로, 주거지 등에 대한 침수피해를 사전에 예방하고 자연재해로부터 주민의 소중한 생명과 재산 보호

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ '18.  3.~ : 1개 지구(서성로) 실시설계 용역시행

○ '22.  2. 21. : 타당성조사 및 기본계획 용역 발주

○ '22.  3.  8. : 수산2리 마을회(마을이장 면담) 사전협의(방문)

○ '22.  3. 14. : 타당성조사 및 기본계획용역 착수(용역사 ㈜유신)

○ '22.  3. 22. : 수산2리 마을회(마을이장 면담) 사전협의(방문)

○ '22.  4.  4. : ˊ23년도 사업대상지 신청자료 제출

○ '22.  4.  7. : 1차 심사(서류)

○ '22.  4. 21. : 2차 심사(발표)

○ '22.  4. 26. : 3차 심사(현장실사)

○ '22.  7. 13.∼7. 22. : 지자체전문가(5인) 자문 및 검토의견 수렴

○ '22.  9. 13.∼9. 18. : 도 및 중앙전문가 검토의견 수렴

○ '22.  9. 15. : 2023년도 예산(가내시) 통보(수산2 지구 예산 반영)

○ '22. 12. 27. : 수산2 재해위험개선지구 지정·고시

○ '23.  6. 27. : 실시설계용역 착수

○ '25.  7. 16. : 사전설계검토 협의(행정안전부) 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2023년 ~ 2027년(5개년)

○ 위  치: 서귀포시 성산읍 수산리 3345번지 일원

○ 내  역: 베수로 2.74㎞, 저류지 3개소, 세천 0.16㎞

○ 공정률: -

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		17,606	7,600	1,000	500	500	0	-	-	9,006
보상비	1식	4,629	2,291	978	489	489		-	-	1,360
공사비	2.9㎞	12,861	5,236	-	-	-		-	-	7,625
부대비	1식	116	73	22	11	11		-	-	21

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		향후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		17,606		7,600		1,000		9,006
보상비	73,900㎡	4,629	26,020㎡	2,291	15,000㎡	978	32,880㎡	1,360
공사비	2.9㎞	12,861	1.2㎞	5,236			1.2㎞	7,625
부대비	1식	116	측량 등	73	측량 등	22	측량 등	21

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	향후계획	비 고
계	17,606	7,600	1,000	9,006
국 비	8,803	4,800	500	3,503
지 방 채	1,000	1,000	-	-
시 도 비	7,803	1,800	500	5,503

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 재해위험요인을 근원적으로 해소하여 주민의 생명과 재산보호

105		상하모지구 우수저류시설 설치사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 태풍 및 집중호우 시 상습침수가 발생하는 대저읍 지역 상류에 우수저류지를 설치하여 유역내 홍수량 저감을 통한 항구적 재해예방

2. 지방채 발행계획: 2,000백만원

3. 추진경위

○ '22. 12.: 우수유출저감시설 사업 5개년 계획 수립

※ 행안부 재난영향분석과(상․하모지구 포함)

○ '23. 2. 14.: '24년 신규 우수저류시설 설치사업 타당성조사용역 착수

○ '23. 2. 15.: 상모3리 마을회 의견 청취 및 현장 확인(과장 외 2)

- 침수피해 예방을 위한 저류지 설치 요청

○ '23. 3. 2.: 2024년 신규 대상지구 사업 신청

○ '23. 3. 31.: 2024년 우수저류시설 신규지구 선정심의회 개최(행안부)

○ '23. 4. 5.: 2024년 우수저류시설 신규지구 선정 통보(행안부)

○ '23. 9.: 2024년 우수저류시설 설치사업 정부 예산안 통보

○ '24. 3.: 기본 및 실시설계 용역 착수

○ '24. 9.: 1차 주민설명회 개최(상모2리 복지회관)

○ '24. 10.: 2차 주민설명회 개최(상모3리 복지화관)

○ '24. 12.: 기본설계 사전 협의(행안부)

○ '25. 6. 24.: 사전설계심의(행안부) ＊조건부승인

○ '25. 7.: 기본 및 실시설계 용역 완료

○ '25. 7. ~ 9.: 사전설계심의, 일상감사, 계약심사 등 행정절차이행

○ '25. 10. 2.: 공사 발주

4. 사업개요

○ 위  치: 서귀포시 대정읍 상모리 3103-1번지 일원

○ 사업량: 저류지설치(V=23,853㎥) 1개소, 우수유입 및 유출관 설치 L=1.46km

○ 사업비: 24,100백만원(국비 12,050, 도비 12,050)

○ 기  간: 2024년 ~ 2027년

○ 공정률: 0%(공사 발주)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		24,100	17,400	4,000	2,000	2,000				2,700
시설비	1식	12,900	7,200	3,500	1,750	1,750				2,200
보상비	1식	10,000	10,000
감리비	1식	1,200	200	500	250	250				500

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
시설비	저류지1개소 (V=23,853㎥), 우수유입 및 유출관 설치 L=1.46km	24,100	토지보상비 기본 및 시설시설계비, 공사비	17,400	공사비 및 감리비	4,000	공사비 및 감리비	2,700

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	24,100	17,400	4,000	2,700
국 비	12,050	8,700	2,000	1,350
지 방 채	2,000	-	2,000
시 도 비	10,050	8,700	-	1,350

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 상습침수지역인 상·하모 지역의 항구적인 재해대책 마련으로 침수로 인한 주민들의 인명 및 재산 보호

106		민군복합항 진입도로 선형개선사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 강정마을 진입도로의 불량 선형을 개선하고 계획홍수의에 미달하는 교량의 재가설을 통하여 지역주민 안전사고 및 침수피해 예방

2. 지방채 발행계획: 3,000백만원

3. 추진경위

○ '17. 6.: 하천기본계획(변경) 완료

○ '19. 7. 24.: 기획재정부 국방예산과 국고절충

○ '20. 2. 19.: 해군본부로부터 사업비 90억원 세입조치

○ '20. 4.: 실시설계용역 착수

○ '22. 12.~‘24.5: 민군복합항 진입도로 선형개량공사(악근교)추진

○ '24. 3.: 강정교 구간 2종보호식물 솔잎난 보전·복원계획 협의(환경부)

○ '24. 3.: 솔잎난 포자채취 및 인공증식 용역(1차) 추진

○ '25. 3.: 솔잎난 포자채취 및 인공증식 용역(2차) 추진

4. 사업개요

○ 위  치: 서귀포시 강정동 5647-1번지 일원

○ 사업량: 교량정비 2개소, 도로선형조정 L=0.54km

○ 사업비: 9,000백만원(자체재원)

○ 기  간: 2020년 ~ 2027년

○ 공정률: 40%(악근교 구간 준공)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
시설비	1식	9,000	2,475	3,000		3,000				3,525

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
시설비	교량정비 2개소, 도로선형조정 L=0.54km	9,000	교량 1개소 (악근교) 완료	2,475	공사비	3,000	공사비	3,525

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,000	2,514	3,000	3,525
시 도 비	6,000	2,475	-	3,525
지 방 채	3,000	-	3,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 교량 재가설 및 도로선형 개선을 통한 안전사고 방지 및 재해예방

107		성산읍 고성리 도시재생 기반시설 구축사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 국토부 공모사업(‘23년 선정)으로 성산읍 고성리 지역의 도시브랜드화, 생활환경개선 등 주민 주도의 도시재생사업을 통한 도시경쟁력 강화 및 삶의 질 개선

2. 지방채 발행계획: 3,600백만원

3. 추진경위

○ 2021.  5.  성산읍 도시재생 현장지원센터 구축 및 운영개시

○ 2022.  1.~2023. 7.  고성리 도시재생 예비사업 공모 선정 및 사업 추진

○ 2023. 12.  고성리 도시재생사업 선정 발표(국토부)

○ 2024.  6.  도시재생사업 공기관대행 위·수탁 체결(제주특별자치도개발공사)

○ 2024.  8.  웰니스 워케이션 센터 현황측량 완료

○ 2025.  2.  웰니스 워케이션 센터 공공건축심의 완료

○ 2025.  6.  웰니스 워케이션 센터 실시설계용역 추진

○ 2025.  9.  고수천 생태공원 공공디지인 심의완료

○ 2025.  9.  고성리 도시재생사업 주민설명회 개최(2회)

○ 2025. 10.  마을안길 교류센터 매장문화재 발굴조사 계약 및 착수

4. 사업개요

○ 사업기간: 2024년~2027년(4개년)

○ 사업위치: 서귀포시 성산읍 고성리 1135-7번지 일원(1,217,507㎡)

○ 사업내역: 웰니스 워케이션 센터(2,125㎡/4층), 마을안길 교류센터(131㎡/1층), 고수천 생태 공원(420m), 동남 웰니스거리(3,543m) 조성 등

○ 공 정 률: 20%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계	고성리 도시재생사업 1식	25,768	5,848	9,122	5,473	3,600	49	-	-	10,798
공사비	워케이션센터 외 공사 추진	20,234	3,013	8,210	4,926	3,250	34	-	-	9,011
감리비	워케이션센터 외 감리 추진	2,248	335	912	547	350	15	-	-	1,001
부대비	기본계획 및 실시설계용역	3,286	2,500	-	-	-	-	-	-	786

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계	고성리 도시재생사업 1식	25,768	고성리 도시재생사업 1식	5,848	고성리 도시재생사업 1식	9,122	고성리 도시재생사업 1식	10,798
공사비	워케이션센터 외 공사 추진	20,234	워케이션센터 외 공사 추진	3,013	워케이션센터 외 공사 추진	8,210	워케이션센터 외 공사 추진	9,011
감리비	워케이션센터 외 감리 추진	2,248	워케이션센터 외 감리 추진	335	워케이션센터 외 감리 추진	912	워케이션센터 외 감리 추진	1,001
부대비	기본계획 및 실시설계용역	3,286	기본계획 및 실시설계용역	2,500	기본계획 및 실시설계용역	-	기본계획 및 실시설계용역	786

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	25,768	5,848	9,122	10,798
국 비	15,000	3,425	5,473	6,102
지 방 채	3,600	-	3,600	-
시 도 비	7,168	2,423	49	4,696

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 쇠퇴하는 도심지 내 지역역량 강화, 새로운 기능의 도입ㆍ창출 및 지역 자원의 활용을 통하여 경제적ㆍ사회적ㆍ환경적으로 활성화 기여하고 지역간 균형발전 선도

108		장기미집행도시계획시설(도로) 화순사거리~화순항 (중로2-5-2호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획도로 확장을 통한 화순금모래해변 접근성 향상으로 지역주민과 관광객들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 1,600백만 원

3. 추진경위

○ 1980. 12. 18.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2029년(11개년)

○ 위  치: 안덕면 화순리 337-6번지~화순리 825-5번지 일원

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=0.695km, B=15m

○ 공정률: -%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후 계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		12,545	5,545	1,600		1,600				5,400
공사비	L=695m	3,600		500		500				3,100
보상비	1식	8,900	5,500	1,100		1,100				2,300
부대비	1식	45	45

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		12,545		5,545		1,600		5,400
공사비	토공 1식	1,500			1식	300	1식	1,200
	구조물공 1식	1,000			1식	150	1식	850
	포장공 1식	900					1식	900
	상하수도공 1식	100			1식	40	1식	60
	부대공 1식	100			1식	10	1식	90
보상비	토지 9.976㎡	8,900	1식	5,500	1식	1,100	1식	2,300
부대비	설계 등 1식	45	1식	45

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	12,545	5,545	1,600	5,400
국 비
지 방 채	8,900	5,500	1,600	1,800
시 도 비	3,645	45		3,600

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 기존 도로를 확장하여 지역주민과 관광객들의 통행불편 및 교통난을 해소하여 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

109		장기미집행도시계획시설(도로) 남원(소로2-44호선)도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 협소한 마을안길 도로를 개설하여 도로 이용객 편의 도모 및 인접 도로 접근성 향상

2. 지방채 발행계획: 600백만 원

3. 추진경위

○ 1977.  8.  도시계획도로 결정

○ 2019. 10.  실시설계용역 착수

○ 2020.  6.  실시계획작성 고시

○ 2025.  6.  실시계획작성(변경) 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2027년(9개년)

○ 위  치: 태흥리 1011-3번지~태흥리 496-2번지

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=0.525km, B=8m

○ 공정률: -%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		3,890	2,170	640		600	40			1,080
공사비	L=525m	1,200		500		500				700
보상비	1식	2,650	2,130	140		100	40			380
부대비	1식	40	40

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		3,890		2,170		640		1,080
공사비	토공 1식	400			1식	200	1식	200
	구조물공 1식	300			1식	150	1식	150
	포장공 1식	300			1식	100	1식	200
	상하수도공 1식	100			1식	45	1식	55
	부대공 1식	100			1식	5	1식	95
보상비	토지 3,332㎡	2,650	1식	2,130	1식	140	1식	380
부대비	설계 등 1식	40	1식	40

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	3,890	2,170	640	1,080
국 비
지 방 채	3,610	2,130	600	880
시 도 비	280	40	40	200

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 신설하여 지역주민 교통편의를 제공하고 인근도로 접근성 향상 및 보행환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

110		장기미집행도시계획시설(도로) 대정 하모지구(소로2-13호선)도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 협소한 마을안길 도로를 개설하여 도로 이용객 편의 도모 및 인접 도로 접근성 향상

2. 지방채 발행계획: 300백만 원

3. 추진경위

○ 1988.  3.  도시계획도로 결정

○ 2019. 10.  실시설계용역 착수(완료:19. 12.)

○ 2020.  6.  실시계획작성 고시

○ 2025.  6.  실시계획작성(변경) 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2027년(9개년)

○ 위  치: 서귀포시 대정읍 하모리(대정농협 북측)

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=0.225㎞, B=8m

○ 공정률: -%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		2,520	1,420	300		300				800
공사비	L=225m	1,100		300		300				800
보상비	1식	1,410	1,410
부대비	1식	10	10

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		2,520		1,420		300		800
공사비	토공 1식	400			1식	150	1식	250
	구조물공 1식	270			1식	80	1식	190
	포장공 1식	250					1식	250
	상하수도공 1식	100			1식	60	1식	40
	부대공 1식	80			1식	10	1식	70
보상비	토지 1,501㎡	1,410	1식	1,410
부대비	설계 등 1식	10	1식	10

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	2,520	1,420	300	800
국 비
지 방 채	1,710	1,410	300
시 도 비	810	10	-	800

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 신설하여 지역주민 교통편의를 제공하고 인근도로 접근성 향상 및 보행환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

111		장기미집행도시계획시설(도로) 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도시계획도로 개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 2,500백만 원

3. 추진경위

○ 1975.  6. 17.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018.  5.  공사 착공(장기계속공사)  ※1공구 완료('24.12.10.)

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획인가 고시 완료

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2029년(11개년)

○ 위  치: 중문주공아파트~회수사거리 일원

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=1,600m, B=35m

○ 공정률: 45%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		48,900	38,440	2,500		2,500				7,960
공사비	L=1,600m	18,300	10,300	1,000		1,000				7,000
보상비	1식	30,600	28,140	1,500		1,500				960
부대비	1식

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		48,900		38,440		2,500		7,960
공사비	토공 1식	6,200	1식	4,000	1식	500	1식	1,700
	구조물공 1식	5,500	1식	4,000	1식	500	1식	1,000
	포장공 1식	3,500	1식	2,200			1식	1,300
	상하수도공 1식	1,800	1식	100			1식	1,700
	부대공 1식	1,300					1식	1,300
보상비	토지 35,888㎡	30,600	1식	28,140	1식	1,500	1식	960
부대비	설계 등 1식

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	48,900	38,440	2,500	7,960
국 비
지 방 채	23,460	19,000	2,500	1,960
시 도 비	25,440	19,440	-	6,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 중문~회수 간 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

112		장기미집행도시계획시설(도로) 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 1,200백만 원

3. 추진경위

○ 2000. 12. 30.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27. 장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2019. 10.  공사 착공(장기계속공사)  ※1공구 완료('22. 7. 9.)

○ 2020.  6.  실시계획인가 고시 완료

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2018년 ~ 2030년(12개년)

○ 위  치: 서홍동 253-3번지 ~ 동홍동 1696-8번지

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=1,095m, B=15m

○ 공정률: 14%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		18,889	10,354	3,100		1,200	1,900			5,435
공사비	L=1,095m	5,700	1,165	1,100			1,100			3,435
보상비	1식	13,100	9,100	2,000		1,200	800			2,000
부대비	1식	89	89

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		18,889		10,354		3,100		5,435
공사비	토공 1식	1,600	1식	350	1식	400	1식	850
	구조물공 1식	700	1식	150	1식	100	1식	450
	포장공 1식	1,400	1식	200	1식	250	1식	950
	상하수도공 1식	1,200	1식	250	1식	250	1식	700
	부대공 1식	800	1식	215	1식	100	1식	485
보상비	토지 9,245㎡	13,100	1식	9,100	1식	2,000	1식	2,000
부대비	설계 등 1식	89	1식	89

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	18,889	10,354	3,100	5,435
국 비
지 방 채	13,735	9,100	1,200	3,435
시 도 비	5,154	1,254	1,900	2,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 서홍주거지역 내 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한  도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

113		장기미집행도시계획시설(도로) 삼성여고~칼호텔(중로3-1-18호선)도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획도로 신설을 통해 지역주민의 교통편의 제공 및 인접도로 접근성 향상

2. 지방채 발행계획: 500백만 원

3. 추진경위

○ 1997. 11.  도시계획도로 결정

○ 2018.  8.  장기미집행 도시계획도로 우선사업대상 선정

○ 2020.  6.  실시계획작성 고시

○ 2023.  3.  공사 착공(장기계속공사)

○ 2025.  6.  실시계획작성(변경) 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2028년(11개년)

○ 위  치: 토평동 892-1번지 ~ 토평동 620-9번지

○ 내  역: 도로 개설 L=0.756㎞, B=12m

○ 공정률: 20%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,160	5,060	500		500				600
공사비	L=756m	1,800	700	500		500				600
보상비	1식	4,310	4,310
부대비	1식	50	50

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		6,160		5,060		500		600
공사비	토공 1식	500	1식	300	1식	200
	구조물공 1식	300	1식	200	1식	100
	포장공 1식	500			1식	200	1식	300
	상하수도공 1식	300	1식	200			1식	100
	부대공 1식	200					1식	200
보상비	토지 6,807㎡	4,310	1식	4,310
부대비	설계 등 1식	50	1식	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,160	5,060	500	600
국 비
지 방 채	5,410	4,310	500	600
시 도 비	750	750

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 신설하여 지역주민 교통편의를 제공하고 인근도로 접근성 향상 및 보행환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

114		장기미집행도시계획시설(도로) 쇠소깍 인근(소로2-6호선)도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 지역주민 주거지 내 마을안길 신설하여 통행 편의성 향상 및 지역주민 숙원사업 해소

2. 지방채 발행계획: 500백만 원

3. 추진경위

○ 1997. 11.  도시계획(시설)도로 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼ 단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획작성 고시

○ 2023.  3.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 2년차

○ 2025.  6.  실시계획작성(변경) 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2027년(9개년)

○ 위  치: 하효동 614-1번지~하효동 494-11번지

○ 내  역: 도로 개설 L=0.415km, B=8m

○ 공정률: 26%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		4,679	3,979	500		500				200
공사비	L=415m	1,200	500	500		500				200
보상비	1식	3,450	3,450
부대비	1식	29	29

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		4,679		3,979		500		200
공사비	토공 1식	500	1식	250	1식	250	1식
	구조물공 1식	300		150		150
	포장공 1식	250		50		20		180
	상하수도공 1식	100		40		60
	부대공 1식	50		10		20		20
보상비	토지 3,586㎡	3,450	1식	3,450
부대비	설계 등 1식	29	1식	29

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	4,679	3,979	500	200
국 비
지 방 채	700		500	200
시 도 비	3,979	3,979

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 신설하여 지역주민에게 교통편의를 제공하고 인근도로 접근성 향상 및 보행환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

115		장기미집행도시계획시설(도로) 토평동(중로2-1-12호선)도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 지역주민 주거지 내 마을안길 신설하여 통행 편의성 향상 및 지역주민 숙원사업 해소

2. 지방채 발행계획: 600백만 원

3. 추진경위

○ 1977. 2.  도시계획도로 결정

○ 2020. 6.  실시계획작성 고시

○ 2023. 3.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 2년차

○ 2025. 6.  실시계획작성(변경) 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2029년(11개년)

○ 위  치: 토평동 162-1번지 ~ 토평동 2065-5번지

○ 내  역: 도로 개설 L=0.950km, B=15m

○ 공정률: 9%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		15,035	10,385	650		600	50			4,000
공사비	L=950m	5,000	500	500		500				4,000
보상비	1식	9,950	9,800	150		100	50
부대비	1식	85	85

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		15,035		9,885		650		4,500
공사비	토공 1식	2,000			1식	250	1식	1,750
	구조물공 1식	1,000			1식	250	1식	750
	포장공 1식	1,500					1식	1,500
	상하수도공 1식	450					1식	450
	부대공 1식	50					1식	50
보상비	토지 13,652㎡	9,950	1식	9,800	1식	150
부대비	설계 등 1식	85	1식	85

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	15,035	10,385	650	4,000
국 비
지 방 채	8,000	7,400	600
시 도 비	7,035	2,985	50	4,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 신설하여 지역주민 교통편의를 제공하고 인근도로 접근성 향상 및 보행환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

116		장기미집행도시계획시설(도로) 성산읍 고성리(중로2-4-9호선)도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획도로 신설을 통해 지역주민의 교통편의 제공 및 인접도로 접근성 향상

2. 지방채 발행계획: 1,300백만 원

3. 추진경위

○ 1977. 2.  도시계획도로 결정

○ 2018. 7.  장기미집행 도시계획도로 우선사업대상 선정

○ 2020. 6.  실시계획작성 고시

○ 2023. 4.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 2년차

○ 2025. 6.  실시계획작성(변경) 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2030년(12개년)

○ 위  치: 성산읍 고성리 1317-3번지 ~ 고성리 2133-2번지

○ 내  역: 도로 개설 L=1.14km, B=15m

○ 공정률: 9%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		11,280	6,180	1,300		1,300				3,800
공사비	L=1.14km	5,300	500	1,000		1,000				3,800
보상비	1식	5,880	5,580	300		300
부대비	1식	100	100

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		11,280		6,180		1,300		3,800
공사비	토공 1식	1,500	1식	200	1식	300	1식	1,000
	구조물공 1식	800	1식		1식	300	1식	500
	포장공 1식	1,200	1식	100	1식	100	1식	1,000
	상하수도공 1식	1,000	1식	200	1식	300	1식	500
	부대공 1식	800	1식				1식	800
보상비	토지 15,856㎡	5,880	1식	5,580	1식	300
부대비	설계 등 1식	100	1식	100

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	11,280	6,180	1,300	3,800
국 비
지 방 채	9,680	5,580	1,300	2,800
시 도 비	1,600	600		1,000

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 신설하여 지역주민 교통편의를 제공하고 인근도로 접근성 향상 및 보행환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

117		장기미집행도시계획시설(도로) 남원읍 태흥리(중로3-3-6호선 외 1)도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 협소한 마을안길 도로를 개설하여 도로 이용객 편의 도모 및 인접 도로 접근성 향상

2. 지방채 발행계획: 500백만 원

3. 추진경위

○ 1977. 2.  도시계획도로 결정

○ 2018. 7.  장기미집행 도시계획도로 우선사업대상 선정

○ 2020. 6.  실시계획작성 고시

○ 2025. 2.  공사 착공(장기계속공사)

○ 2025. 6.  실시계획작성(변경) 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2029년(11개년)

○ 위  치: 남원읍 태흥리 1721-7번지 ~ 태흥리 1044-12번지

○ 내  역: 도로 개설 L=0.748km, B=8~12m

○ 공정률: 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		3,700	1,800	500		500				1,400
공사비	L=748m	2,200	300	500		500				1,400
보상비	1식	1,450	1,450
부대비	1식	50	50

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		3,700		1,800		500		1,400
공사비	토공 1식	600	1식	200	1식	200	1식	200
	구조물공 1식	400			1식	200	1식	200
	포장공 1식	500			1식	100	1식	400
	상하수도공 1식	400	1식	100			1식	300
	부대공 1식	300					1식	300
보상비	토지 3,992㎡	1,450	1식	1,450
부대비	설계 등 1식	50	1식	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	3,700	1,800	500	1,400
국 비
지 방 채	2,950	1,450	500	1,000
시 도 비	750	350		400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 신설하여 지역주민 교통편의를 제공하고 인근도로 접근성 향상 및 보행환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

118		장기미집행도시계획시설(도로) 중문중학교(소로1-2호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 900백만 원

3. 추진경위

○ 1977. 8. 31.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2020.  6.  실시계획인가 고시 완료

○ 2023.  6.  공사 착공(장기계속공사) ※1차분 완료('24.4.23.), 공사중단 2년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2028년(10개년)

○ 위  치: 중문동 1949-17번지 ~ 중문동 2399-2번지

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=516m, B=10m

○ 공정률: 24%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		7,939	5,239	1,600		900				1,800
공사비	L=516m	1,900	500	600		600				800
보상비	1식	6,000	4,700	1,000		300				1,000
부대비	1식	39	39

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		7,939		5,239		900		1,800
공사비	L=516m	1,900	1식	500	1식	600	1식	800
보상비	토지 5,312㎡	6,000	1식	4,700	1식	300	1식	1,000
부대비	설계 등 1식	39	1식	39

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,939	5,239	900	1,800
국 비
지 방 채	4,900	3,000	900	1,000
시 도 비	3,039	2,239		800

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 중문중학교 남측 도시계획도로 신설사업으로 시가지 집중 교통량 분산 및 원활한 차량통행을 위해 사업추진을 위한 예산 반영 필요

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

119		장기미집행도시계획시설(도로) 보목동(중로2-1-13호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통한 초등학교 주변 교통안전시설 확충으로 보행자 안전확보 및 원활한 차량통행으로 지역주민에게 교통편의 제공

2. 지방채 발행계획: 600백만 원

3. 추진경위

○ 1986.  6. 27.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2023.  3.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 2년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2028년(10개년)

○ 위  치: 보목초등학교 서측 일대

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=960m, B=15m

○ 공정률: 8%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		13,532	8,232	650		600				4,650
공사비	L=960m	5,200	500	500		500				4,200
보상비	1식	8,250	7,650	150		100	50			450
부대비	1식	82	82

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		13,532		8,232		650		4,650
공사비	토공 1식	2,400	1식	200	1식	300	1식	1,900
	구조물공 1식	1,200		100		150	1식	950
	포장공 1식	800		80			1식	720
	상하수도공 1식	400		100		50	1식	250
	부대공 1식	400		20			1식	380
보상비	토지 14,272㎡	8,250	1식	7,650	1식	150	1식	450
부대비	설계 등 1식	82	1식	82

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	13,532	8,232	650	4,650
국 비
지 방 채	7,150	6,200	600	350
시 도 비	6,382	2,032	50	4,300

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 개설로 초등학교 주변 통학환경 및 지역주민 교통환경을 개선함으로써 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

120		장기미집행도시계획시설(도로) 성산읍(중로2-4-8호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 도시계획도로 신설을 통해 지역주민의 교통편의 제공 및 인접도로 접근성 향상

2. 지방채 발행계획: 600백만원

3. 추진경위

○ 1975. 5.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2018. 8.  장기미집행 도시계획도로 우선사업대상 선정

○ 2020. 6.  실시계획인가 고시

○ 2022. 4.  공사 착공(장기계속공사)

○ 2025. 6.  실시계획인가(변경) 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2029년(11개년)

○ 위  치: 서귀포시 성산읍 고성리(성산LH아파트 인근)

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=780m, B=15m

○ 공정률: 40%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		5,660	3,160	600		600				1,900
공사비	L=780m	4,400	1,900	600		600				1,900
보상비	1식	1,210	1,210
부대비	1식	50	50

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		5,660		3,160		600		1,900
공사비	토공 1식	1,200	1식	500	1식	200	1식	500
	구조물공 1식	500	1식	300	1식	50	1식	150
	포장공 1식	1,000	1식	400	1식	200	1식	400
	상하수도공 1식	1,000	1식	400	1식	100	1식	500
	부대공 1식	700	1식	300	1식	50	1식	350
보상비	토지 10,982㎡	1,210	1식	1,210
부대비	설계 등 1식	50	1식	50

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	5,660	3,160	600	1,900
국 비
지 방 채	3,010	1,210	600	1,200
시 도 비	2,650	1,950		700

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 신설하여 지역주민 교통편의를 제공하고 인근도로 접근성 향상 및 보행환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

121		장기미집행도시계획시설(도로) 토평동~상효동 중산간대로(대로3-1-1) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 2,500백만 원

3. 추진경위

○ 1965.  3. 4.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2025.  6.  실시계획(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2030년(12개년)

○ 위  치: 토평사거리~상효동 일원

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=3,146m, B=25m

○ 공정률: -%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		51,434	16,934	2,500		2,500				32,000
공사비	L=3,146m	26,600	420	1,500		1,500				24,680
보상비	1식	24,420	16,100	1,000		1,000				7,320
부대비	1식	414	414

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		51,434		17,014		2,500		31,920
공사비	토공 1식	14,200	1식	500	1식	1,000	1식	12,700
	구조물공 1식	5,000					1식	5,000
	포장공 1식	4,000					1식	4,000
	상하수도공 1식	2,000			1식	500	1식	1,500
	부대공 1식	1,400					1식	1,400
보상비	토지 78,650㎡	24,420	1식	16,100	1식	1,000	1식	7,320
부대비	설계 등 1식	414	1식	414

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	51,534	17,014	2,500	32,020
국 비
지 방 채	23,900	13,600	2,500	7,800
시 도 비	27,634	3,414	-	24,220

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 서귀포시 중산간도로 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

122		장기미집행도시계획시설(도로) 하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 2,100백만 원

3. 추진경위

○ 1986.  6. 27.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2024.  5.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 1년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2028년(10개년)

○ 위  치: 하원초∼월평마을 일대

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=1,293m, B=15m

○ 공정률: 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		16,599	10,149	2,100		2,100				4,350
공사비	L=1,293m	5,000	1,200	600		600				3,200
보상비	1식	11,410	8,760	1,500		1,500				1,150
부대비	1식	189	189

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		16,599		10,149		2,100		4,350
공사비	토공 1식	2,500	1식	1,200	1식	600	1식	700
	구조물공 1식	1,200					1식	1,200
	포장공 1식	500					1식	500
	상하수도공 1식	100					1식	100
	부대공 1식	700					1식	700
보상비	토지 19,747㎡	11,410	1식	8,760	1식	1,500	1식	1,150
부대비	설계 등 1식	189	1식	189

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	16,599	10,149	2,100	4,350
국 비
지 방 채	8,950	6,000	2,100	850
시 도 비	7,649	4,149	-	3,500

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 월평주거지역 내 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

123		장기미집행도시계획시설(도로) 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 2,500백만 원

3. 추진경위

○ 1974.  5. 10.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2030년(12개년)

○ 위  치: 대정읍 상모리 141-13번지~상모리 982-5번지

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=3,570m, B=15m

○ 공정률: -%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		26,431	7,751	2,500		2,500				16,180
공사비	L=3,570m	14,500	500	1,500		1,500				12,500
보상비	1식	11,580	6,900	1,000		1,000				3,680
부대비	1식	351	351

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		26,431		7,751		2,500		16,180
공사비	토공 1식	6,600		500	1식	1,500	1식	4,600
	구조물공 1식	2,500					1식	2,500
	포장공 1식	2,500					1식	2,500
	상하수도공 1식	1,000					1식	1,000
	부대공 1식	1,900					1식	1,900
보상비	토지 53,918㎡	11,580		6,900	1식	1,000	1식	3,680
부대비	설계 등 1식	351	1식	351

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	26,431	7,751	2,500	16,180
국 비
지 방 채	12,280	6,900	2,500	2,880
시 도 비	14,151	851	-	13,300

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 월평주거지역 내 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

124		장기미집행도시계획시설(도로) 성산읍 수산리(중로2-4-12호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 성산지역 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통편의 제공

2. 지방채 발행계획: 600백만 원

3. 추진경위

○ 1993. 11. 16.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획인가 고시 완료

○ 2023.  3.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 2년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2026년(9개년)

○ 위  치: 성산읍 수산리 271-3번지~수산리 399-3번지

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=700m, B=15m

○ 공정률: 16%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,413	4,563	650		600	50			1,200
공사비	L=0.7km	2,200	500	500		500				1,200
보상비	1식	4,050	3,900	150		100	50
부대비	1식	163	163

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		6,413		4,563		650		1,200
공사비	토공 1식	800	1식	200	1식	150	1식	450
	구조물공 1식	500	1식	150	1식	50	1식	300
	포장공 1식	400	1식	50	1식	100	1식	250
	상하수도공 1식	400	1식	50	1식	150	1식	200
	부대공 1식	100	1식	50	1식	50
보상비	토지 15,856㎡	4,050	1식	3,900	1식	150
부대비	설계 등 1식	163	1식	163

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,413	4,563	650	1,200
국 비
지 방 채	5,300	3,900	600	800
시 도 비	1,113	663	50	400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 서귀포시 일주도로 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

125		장기미집행도시계획시설(도로) 보목(소로1-3호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 마을 주거지 내 협소한 기존 도로를 확장해 원활한 차량통행 및 안전한 보행환경 조성하여 지역주민 숙원사업 해소

2. 지방채 발행계획: 800백만 원

3. 추진경위

○ 1977.  8.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획인가 고시 완료

○ 2023.  3.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 2년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2028년(10개년)

○ 위  치: 서귀포시 보목동(장안아파트 서측)

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=714m, B=8m

○ 공정률: 20%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,669	4,269	820		800	20			1,580
공사비	L=7,465m	2,300	500	500		500				1,300
보상비	1식	4,300	3,700	320		300	20			280
부대비	1식	69	69

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		6,669		4,269		820		1,580
공사비	토공 1식	900	1식	250	1식	300	1식	350
	구조물공 1식	700	1식	150	1식	150	1식	400
	포장공 1식	350	1식	50			1식	300
	상하수도공 1식	300	1식	50	1식	50	1식	200
	부대공 1식	50					1식	50
보상비	토지 49,739㎡	4,300	1식	3,700	1식	320	1식	280
부대비	설계 등 1식	69	1식	69

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,669	4,269	820	1,580
국 비
지 방 채	1,800	1,000	800	-
시 도 비	4,869	3,269	20	1580

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 도시계획도로 확장을 통해 지역주민에게 원활한 차량통행 및 안전한 보행환경을 제공함으로써 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

126		장기미집행도시계획시설(도로) 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 1,400백만 원

3. 추진경위

○ 1975.  6. 17.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2024.  7.  공사 착공(장기계속공사)

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2030년(12개년)

○ 위  치: 성산읍 오조리 1310-10번지~오조리 7-4번지

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=1,480m, B=25m

○ 공정률: 15%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		14,310	5,610	1,400		1,400				7,300
공사비	L=1,480m	7,800	500							7,300
보상비	1식	6,250	4,850	1,400		1,400
부대비	1식	260	260

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		14,310		5,610		1,400		7,300
공사비	토공 1식	2,500	1식	200			1식	2,300
	구조물공 1식	1,500	1식	50			1식	1,450
	포장공 1식	1,400					1식	1,400
	상하수도공 1식	1,200	1식	200			1식	1,000
	부대공 1식	1,200	1식	50			1식	1,150
보상비	토지 9,628㎡	6,250	1식	4,850	1식	1,400
부대비	설계 등 1식	260	1식	260

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	15,810	5,610	1,400	7,300
국 비
지 방 채	11,550	4,850	1,400	3,800
시 도 비	4,260	760		3,500

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 성산리 일대 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

127		장기미집행도시계획시설(도로) 효돈 (소로1-9호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 지역주민 주거지 내 마을안길 신설하여 통행 편의성 향상 및 지역주민 숙원사업 해소

2. 지방채 발행계획: 1,000백만 원

3. 추진경위

○ 1977.  8.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획인가 고시 완료

○ 2024.  7.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 1년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2029년(11개년)

○ 위  치: 서귀포시 신효동796-7번지 ~ 하효동 197-3번지

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=580m, B=10m

○ 공정률: 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		7,873	4,473	1,000		1,000				2,400
공사비	L=580m	2,700	300	500		500				1,900
보상비	1식	5,130	4,130	500		500				500
부대비	1식	43	43

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		7,873		4,473		1,000		2,400
공사비	토공 1식	900	1식	130	1식	250	1식	520
	구조물공 1식	800	1식	100	1식	130	1식	570
	포장공 1식	700	1식	50	1식	70	1식	580
	상하수도공 1식	200	1식	20	1식	30	1식	150
	부대공 1식	100			1식	20	1식	80
보상비	토지 5,257㎡	5,130	1식	4,130	1식	500	1식	500
부대비	설계 등 1식	43	1식	43

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,873	4,473	1,000	2,400
국 비
지 방 채	3,000	2,000	1,000	-
시 도 비	4,873	2,473	-	2,400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 지역주민 주거지 내 마을안길 신설하여 통행 편의성 향상 및 지역주민 숙원사업 해소

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

128		장기미집행도시계획시설(도로) 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 1,900백만 원

3. 추진경위

○ 1974.  5. 10.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27. 장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2023. 10.  공사 착공(장기계속공사)

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2025년(7개년)

○ 위  치: 대정읍 하모리~상모리

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=2,070m, B=25m

○ 공정률: 45%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		32,010	24,268	2,852	926	1,900				4,890
공사비	L=2,070m	13,200	9,148	1,852	926	900	26			2,200
보상비	1식	18,400	14,710	1,000		1,000				2,690
부대비	1식	410	410

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		32,010		24,268		2,852		4,890
공사비	토공 1식	7,100	1식	5,100	1식	1,000	1식	1000
	구조물공 1식	2,000	1식	1,000	1식	148	1식	852
	포장공 1식	2,200	1식	1,400	1식	500	1식	300
	상하수도공 1식	1,000	1식	796	1식	204
	부대공 1식	900	1식	852			1식	48
보상비	토지 51,735㎡	18,400	1식	14,710	1식	1,000	1식	2,690
부대비	설계 등 1식	410	1식	410

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	32,010	24,268	2,852	4,890
국 비	926		926
지 방 채	17,974	13,900	1,900	2,174
시 도 비	13,110	10,368	26	2,716

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 서귀포시 대정읍 일대 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

129		장기미집행도시계획시설(도로) 효돈 (소로1-5호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 지역주민 주거지 내 마을안길 신설하여 통행 편의성 향상 및 지역주민 숙원사업 해소

2. 지방채 발행계획: 500백만 원

3. 추진경위

○ 1977.  8.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획인가 고시 완료

○ 2024.  7.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 1년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2028년(10개년)

○ 위  치: 서귀포시 신효동(국립농산물 품질관리원 북측)

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=560m, B=10m

○ 공정률: 10%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,804	4,904	500		500				1,400
공사비	L=560m	2,200	300	500		500				1,400
보상비	1식	4,560	4,560
부대비	1식	44	44

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		6,804		4,904		500		1,400
공사비	토공 1식	700	1식	100	1식	150	1식	450
	구조물공 1식	650	1식	80	1식	130	1식	440
	포장공 1식	550	1식	70	1식	110	1식	370
	상하수도공 1식	200	1식	50	1식	80	1식	70
	부대공 1식	100			1식	30	1식	70
보상비	토지 5,565㎡	4,560	1식	4,560
부대비	설계 등 1식	44	1식	44

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,804	4,904	500	1,400
국 비
지 방 채	1,500	1,000	500	-
시 도 비	5,304	3,904	-	1,400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 지역주민 주거지 내 마을안길 신설하여 통행 편의성 향상 및 지역주민 숙원사업 해소

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

130		장기미집행도시계획시설(도로) 화순마을안길 (소로2-13호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 지역주민 주거지 내 마을안길 신설하여 통행 편의성 향상 및 지역주민 숙원사업 해소

2. 지방채 발행계획: 600백만 원

3. 추진경위

○ 1982. 12.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획인가 고시 완료

○ 2023.  5.  공사 착공(장기계속공사)  ※마무리 사업

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2026년(8개년)

○ 위  치: 서귀포시 안덕면 화순리(화순목욕탕 서측)

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=564m, B=8m

○ 공정률: 62%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		5,410	4,810	600		600
공사비	L=564m	1,800	1,200	600		600
보상비	1식	3,573	3,573
부대비	1식	37	37

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		5,410		4,810		600		-
공사비	토공 1식	600	1식	550	1식	50
	구조물공 1식	550	1식	450	1식	100
	포장공 1식	400	1식	50	1식	350
	상하수도공 1식	150	1식	90	1식	60
	부대공 1식	100	1식	60	1식	40
보상비	토지 4,540㎡	3,573	1식	3,573
부대비	설계 등 1식	37	1식	37

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	5,410	4,810	600	-
국 비
지 방 채	2,100	1,500	600	-
시 도 비	3,310	3,310

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 지역주민 주거지 내 마을안길 신설하여 통행 편의성 향상 및 지역주민 숙원사업 해소

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

131		장기미집행도시계획시설(도로) 상예동~중문동(대로1-1-1)도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 5,500백만 원

3. 추진경위

○ 1966. 11. 9.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2025.  6.  실시계획(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2030년(12개년)

○ 위  치: 중문고등학교~창천삼거리 일원

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=7,465m, B=35m

○ 공정률: -%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		106,904	33,254	5,500		5,500				68,150
공사비	L=7,465m	60,000	700	1,500		1,500				57,800
보상비	1식	46,200	31,850	4,000		4,000				10,350
부대비	1식	704	704

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		106,904		33,254		5,500		68,150
공사비	토공 1식	3,200			1식	1,000	1식	2,200
	배수공 1식	7,700					1식	7,700
	오수공 1식	3,700					1식	3,700
	가시설공 1식	1,300					1식	1,300
	교량공 1식	2,900					1식	2,900
	구조물공 1식	4,000					1식	4,000
	포장공 1식	2,600					1식	2,600
	상하수도공 1식	1,000				500	1식	500
	교통안전시설공 1식	1,000					1식	1,000
	부대공 1식	1,800					1식	1,800
	기타 1식	30,800	1식	700			1식	30,100
보상비	토지 49,861㎡	46,200		31,850		4,000		10,350
부대비	설계 등 1식	704	1식	704

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	106,904	33,254	5,500	68,150
국 비
지 방 채	40,050	25,000	5,500	9,550
시 도 비	66,854	8,254	-	58,600

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 서귀포시 중산간도로 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

132		장기미집행도시계획시설(도로) 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 1,200백만 원

3. 추진경위

○ 1997. 11.  5.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2023. 11.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 2년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2025년(7개년)

○ 위  치: 대포~컨벤션 일대

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=1,220m, B=30m

○ 공정률: 5%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		31,564	21,014	1,000		1,200				9,350
공사비	L=1,220m	9,300	500	1,000		1,000				7,800
보상비	1식	22,100	20,350			200				1,550
부대비	1식	164	164

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		31,564		21,014		1,200		9,350
공사비	토공 1식	3,500	1식	500	1식	1,000	1식	2,000
	구조물공 1식	2,800					1식	2,800
	포장공 1식	1,000					1식	1,000
	상하수도공 1식	1,000					1식	1,000
	부대공 1식	1,000					1식	1,000
보상비	토지 38,615㎡	22,100	1식	20,350	1식	200	1식	1,550
부대비	설계 등 1식	164	1식	164

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	31,564	21,014	1,200	9,350
국 비
지 방 채	21,650	19,400	1,200	1,050
시 도 비	9,914	1,614	-	8,300

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 대포~컨벤션 간 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한  도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

133		장기미집행도시계획시설(도로) 호근(중로2-1-41호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 서귀포시 도심지 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

2. 지방채 발행계획: 1,400백만 원

3. 추진경위

○ 1997. 11. 24.  도시계획시설(도로) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.∼7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.∼  단계별 집행계획에 따른 편입 토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 고시 완료

○ 2024.  6.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 1년차

○ 2025.  6.  실시계획인가(변경) 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2029년(11개년)

○ 위  치: 호근동 1136-10번지~호근동 1478-6번지 일원

○ 내  역: 도시계획도로 개설 L=1,510m, B=15m

○ 공정률: 7%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		16,930	9,130	400		1,200	200			7,400
공사비	L=1,510m	6,300	500	400		200	200			5,400
보상비	1식	10,400	8,400			1,000				2000
부대비	1식	230	230

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		17,930		9,130		1,400		7,400
공사비	토공 1식	1,500	1식	500	1식	400	1식	600
	구조물공 1식	2,000					1식	2,000
	포장공 1식	2,100					1식	2,100
	상하수도공 1식	500					1식	500
	부대공 1식	200					1식	200
보상비	토지 19,747㎡	11,400	1식	8,400		1,000	1식	2,000
부대비	설계 등 1식	230	1식	230

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	17,930	9,130	1,400	7,400
국 비
지 방 채	10,400	7,000	1,400	2,000
시 도 비	7,530	2,130	-	5,400

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 호근주거지역 내 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한  도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

134		대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 상예, 하예동 마을안길과 일주도로(대유랜드 입구)를 연결하는 도시계획도로를 개설하여 지역주민 숙원사업 해소 및 삶의 질 향상 도모

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 지역 주민숙원사업 해결

2. 지방채 발행계획: 2,700백만 원

3. 추진경위

○ 1997. 11.  도시계획시설 결정

○ 2014.  5.  실시계획작성 고시

○ 2017.  1.  공사발주 행정절차 완료(계약심사, 일상감사 등)

○ 2021.  8.  공사 착공(장기계속공사)  ※공사중단 1년차

4. 사업개요

○ 기  간: 2009년~2026년(17개년)

○ 위  치: 대유랜드 입구(지방도1132호선)~하예1동(하예마을회관)

○ 내  역: 도시계획도로 개설 및 확장 L=2.8㎞, B=15m

○ 공정률: 70%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		10,590	7,890	2,700		2,700
공사비	L=2.8㎞	5,375	2,675	2,700		2,700
보상비	1식	5,090	5,090
부대비	1식	125	125

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		10,590		7,890		2,700
공사비	토공 1식	1,650	1식	995	1식	655
	구조물공 1식	790	1식	560	1식	230
	포장공 1식	1,350	1식	420	1식	930
	상하수도공 1식	750	1식	500	1식	250
	부대공 1식	835	1식	200	1식	635
보상비	토지 33,535㎡	5,090	1식	5,090
부대비	설계 등 1식	125	1식	125

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	10,590	7,890	2,700
국 비
지 방 채	2,700		2,700
시 도 비	7,890	7,890

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 상예, 하예동 마을안길과 일주도로(대유랜드 입구)를 연결하여 지역주민과 관광객들의 통행불편 및 교통난을 해소하여 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

135		서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 중산간도로와 산록도로를 연결하는 도시계획도로를 개설하여 교통량 분산 및 교통편의 제공하기 위함

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 지역 주민숙원사업 해결

2. 지방채 발행계획: 2,500백만 원

3. 추진경위

○ 1997. 11.  도시계획시설 결정

○ 2020.  4.  실시계획 및 의견청취 공고 추진

○ 2020.  5.  사업인정(의제)에 따른 중토위 협의 완료

○ 2020.  6.  실시계획작성 고시

○ 2023. 12.  공사 발주 행정절차 완료(계약심사, 일상감사 등)

○ 2024.  3.  공사 착공(장기계속공사)  ※마무리 사업

4. 사업개요

○ 기  간: 2005년~2026년(21개년)

○ 위  치: 서귀포시 서홍동(혜윰빌~중로3-1-47호선 시점부)

○ 내  역: 도시계획도로 확장 L=1.3㎞, B=15m

○ 공정률: 45%

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,750	4,200	2,550		2,550	50
공사비	L=1.3㎞	4,940	2,390	2,550		2,500	50
보상비	1식	1,750	1,750
부대비	1식	60	60

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		6,750		4,200		2,550
공사비	토공 1식	1,600	1식	970	1식	630
	구조물공 1식	1,400	1식	900	1식	500
	포장공 1식	1,240	1식	300	1식	940
	상하수도공 1식	450	1식	150	1식	300
	부대공 1식	250	1식	70	1식	180
보상비	토지 5,431㎡	1,750	1식	1,750
부대비	설계 등 1식	60	1식	60

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,750	4,200	2,550
국 비
지 방 채	2,500		2,500
시 도 비	4,250	4,200	50

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 서귀포시 중산간도로 교통난 해소와 지역간 균형발전 도모를 위하여 조속한 도시계획도로 개설로 지역주민들에 교통 편의 제공

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 토지주 사유재산권 보호

136		신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 협소한 신례마을안길을 확포장하여 원활한 교통소통 제공 및 지역주민 불편사항 해소

○ 지역 간 균형개발 및 숙원사업 해소

2. 지방채 발행계획: 700백만원

3. 추진경위

○ 2017. 4. 도시계획시설 결정 *고시: 제주도 제2017-110(2017.4.10.)호

- 보상(57%): 192필지(5,646㎡) 중 98필지(3,224㎡) 보상, 94필지(2,422㎡) 미보상

○ 2020. 6. 23. 실시계획 작성 고시 *’25.06.20. 실시계획 연장(~30.12.31.까지)

※ 보상절차이행: 중토위협의(‘20.5), 분할측량(‘19.9), 감정평가(‘19.11), 협의보상통보(‘19.12)

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2030년(11개년)

○ 위  치: 서귀포시 남원읍 신례 739번지 일원(신례초~신례1리사무소~사거리)

○ 내  역: 도로 확장 L=1.2km, B=10m

○ 공정률: 공사(-%) / 보상 (57%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		5,500	1,950	700	-	700	-	-	-	2,850
보상비	192필지 (5,646㎡)	1,900	1,400	400	-	400	-	-	-	100
공사비	도로 확장 (L=1.2km)	3,400	350	300	-	300	-	-	-	2,750
부대비	설계용역 등	200	200	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		5,500		1,950		700	-	2,850
보상비	192필지 (5,646㎡)	1,900	1식	1,400	1식	400	1식	100
공사비	도로 확장 (L=1.2km)	3,400	1식	350	1식	300	1식	2,750
부대비	설계용역 등	200	1식	200	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	5,500	1,950	700	2,850
국 비	-	-	-	-
지 방 채	700	-	700	-
시 도 비	4,800	1,950	-	2,850

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 신례초 서측~신례1리 마을회관 마을 안길 도시계획도로를 연결하는 도시계획도로 사업으로 지역주민 및 이용객들에게 원활한 교통편의 제공

137		장기미집행 도시계획시설(삼매봉공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 이용도가 높고 미래세대를 위해 보존이 필요한 삼매봉공원 내 사유지 매입을 추진하여 일몰(실효)에 대비하고, 공원 해제시 우려되는 난개발 방지를 위함

○ 삼매봉공원 조성을 통해 공원을 찾는 시민들에게 휴식 및 커뮤니티공간을 제공하여 삶의 질을 향상시키고자 함

2. 지방채 발행계획: 10,600백만 원

3. 추진경위

○ 1974.  5. 10.  도시계획시설(도시공원) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.~7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018.  12. 11.  출입허가 및 보상계획 열람공고

○ 2019.  1.~  단계별집행계획에 따른 편입토지 매입 추진

○ 2020.  6. 24.  실시계획 작성 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년 ~ 2027년(9개년)

○ 위  치: 서귀포시 서홍동 821번지 일원

○ 내  역: 사유지 255필지/417,413㎡ 토지매입

○ 공정율: 보상률 83.9%   * 255필지(417,413㎡) 중 177필지(350,601㎡) 완료

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	사유지 매입 1식	118,205	93,655	10,600		10,600	0			13,950

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	사유지매입 417,413㎡	118,205	토지매입 350,061㎡	93,655	토지매입 28,052㎡	10,600	토지매입 39,300㎡	13,950

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	118,205	93,655	10,600	13,950
지 방 채	95,800	82,850	10,600	2,350
시 도 비	22,405	10,805		11,600

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 사유재산권 행사에 제약을 받던 장기미집행 도시계획시설(공원)내 사유지 매입을 추진하여 보상 요구 장기 민원 해소 및 공원 지정 효력 유지

○ 공원조성은 시민의 휴식과 정서 함양 뿐만아니라 대기질개선, 도심온도 조절 등 환경보호 역할 기대

138		장기미집행 도시계획시설(엉또공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 이용도가 높고 미래세대를 위해 보존이 필요한 엉또공원 내 사유지 매입을 추진하여 일몰(실효)에 대비하고, 공원 해제시 우려되는 난개발 방지를 위함

○ 엉또공원 조성을 통해 공원을 찾는 시민들에게 휴식 및 커뮤니티공간을 제공하여 삶의 질을 향상시키고자 함

2. 지방채 발행계획: 2,100백만 원

3. 추진경위

○ 2002.  4. 24.  도시계획시설(도시공원) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.~7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2018. 12. 6.  출입허가 및 보상계획 열람공고

○ 2019.  1.~  단계별집행계획에 따른 편입토지 매입 추진

○ 2020.  6. 24.  실시계획 작성 고시 완료

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년~2027년

○ 위  치: 서귀포시 강정동 1584번지 일원

○ 내  역: 사유지 20필지/74,625㎡ 토지매입

○ 공정율: 보상율 91.8%  * 20필지(74,625㎡) 중 15필지(68,487㎡) 완료

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	사유지 매입 1식	9,300	7,200	2,100		2,100

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	사유지매입 74,625㎡	9,300	토지매입 68,487㎡	7,200	토지매입 6,138㎡	2,100

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,300	7,200	2,100
지 방 채	9,100	7,000	2,100
시 도 비	200	200

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 사유재산권 행사에 제약을 받던 장기미집행 도시계획시설(공원)내 사유지 매입을 추진하여 보상 요구 장기 민원 해소 및 공원 지정 효력 유지

○ 공원조성은 시민의 휴식과 정서 함양 뿐만아니라 대기질개선, 도심온도 조절 등 환경보호 역할 기대

139		장기미집행 도시계획시설(중문공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 접근성이 좋고 미래세대를 위해 주변환경 보존이 필요한 중문공원 내 사유지 매입을 추진하여 일몰(실효)에 대비하고, 공원 해제시 우려되는 난개발 방지를 위함

○ 중문공원 조성을 통해 공원을 찾는 시민들에게 휴식 및 커뮤니티공간을 제공하여 삶의 질을 향상시키고자 함

2. 지방채 발행계획: 8,200백만 원

3. 추진경위

○ 1986.  5. 15.  도시계획시설(도시공원) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.~7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.~  단계별집행계획에 따른 편입토지 매입 추진

○ 2020.  6.  실시계획 작성 고시 완료

○ 2020.  9.  실시계획 작성 고시 취소소송 제기

* 1심 패소, 2심․3심 승소(소송기간: 2021. 10.~2023. 10.)

○ 2023. 11.  토지출입허가 공고

○ 2024.  1.  보상계획 열람공고

○ 2024.  2.  보상협의회 개최 및 감정평가 의뢰

○ 2024.  5.~  토지 및 지장물 보상액 결정 및 보상협의 추진

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년~2027년

○ 위  치: 서귀포시 중문동 2203번지 일원

○ 내  역: 사유지 67필지 / 67,164㎡ 토지매입

○ 공정율: 보상율 70%  * 67필지(67,164㎡) 중 36필지(46,998㎡) 완료

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	사유지 매입 1식	44,800	30,850	8,200		8,200				5,750

< 연도별·공종별 투자계획 >                                    (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	사유지매입 67,164㎡	44,800	토지매입 46,998㎡	30,850	토지매입 11,798㎡	8,200	토지매입 8,368	5,750

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	44,800	30,850	8,200	5,750
지 방 채	38,200	30,000	8,200
시 도 비	6,600	850		5,750

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 사유재산권 행사에 제약을 받던 장기미집행 도시계획시설(공원)내 사유지 매입을 추진하여 보상 요구 장기 민원 해소 및 공원 지정 효력 유지

○ 공원조성은 시민의 휴식과 정서 함양 뿐만아니라 대기질개선, 도심온도 조절 등 환경보호 역할 기대

140		장기미집행 도시계획시설(월라봉공원) 토지매입사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 이용도가 높고 미래세대를 위해 보존이 필요한 월라봉공원 내 사유지 매입을 추진하여 일몰(실효)에 대비하고, 공원 해제시 우려되는 난개발 방지를 위함

○ 월라봉공원 조성을 통해 공원을 찾는 시민들에게 휴식 및 커뮤니티공간을 제공하여 삶의 질을 향상시키고자 함

2. 지방채 발행계획: 1,000백만 원

3. 추진경위

○ 1974.  5. 10.  도시계획시설(도시공원) 결정

○ 2017. 12. 27.  장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립

○ 2018.  4. 3.~7. 26.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  4  2.  장기미집행 도시계획시설 종합대책 수립

○ 2019.  1.~  단계별집행계획에 따른 편입토지 매입 추진

○ 2020.  5. 27.  실시계획 작성 고시

4. 사업개요

○ 기  간: 2019년~2027년(9개년)

○ 위  치: 서귀포시 신효동 산1번지 일원

○ 내  역: 사유지 26필지/225,609㎡ 토지매입

○ 공정율: 보상율 91.2% 　* 26필지(225,609㎡) 중 18필지(200,398㎡) 완료

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
보상비	사유지 매입 1식	16,800	12,700	1,000		1,000				3,100

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
보상비	사유지매입 225,609㎡	13,400	토지매입 200,249㎡	12,700	토지매입 6,275㎡	1,000	토지매입 13,327㎡	3,100

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	16,800	12,700	1,000	3,100
지 방 채	6,400	4,600	1,000	800
시 도 비	10,400	8,100	-	2,300

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 사유재산권 행사에 제약을 받던 장기미집행 도시계획시설(공원)내 사유지 매입을 추진하여 보상 요구 장기 민원 해소 및 공원 지정 효력 유지

○ 공원조성은 시민의 휴식과 정서 함양 뿐만아니라 대기질개선, 도심온도 조절 등 환경보호 역할 기대

141		소규모 배수개선사업(균특이양)

1. 사업목적 또는 필요성

○ 상습침수 농경지에 배수시설 등을 설치하여 농작물 침수예방

2. 지방채 발행계획: 5,000백만원

3. 추진경위

○ 2024년 까지: 35개 지구 중 12개지구 완료

- 하천, 화순, 신천, 수망, 신풍, 토평, 색달, 동광, 하례, 토산, 신흥, 고성

○ 2025년.: 4개지구(계속: 하모․사계, 일몰: 신도․신례) 추진 중

4. 사업개요

○ 기  간: 2016년 ~ 계속

○ 위  치: 서귀포시 일원

○ 내  역: 배수로 시설 35개지구 L=33.28km(516.2ha)

○ 공정률: 24년도 까지 1우개 지구 완료

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
공사비	35개지구 L=33.28km	91,130	34,303	5,000	-	5,000	-	-	-	51,827

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
공사비	35개지구 L=33.28km	91,130	14개 지구 L=14.22km	34,303	4개지구 L=1.5km	5,000	17개지구 L=17.56km	51,827

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	91,130	34,303	5,000	56,827
국 비	2,063	2,063	-	-
지 방 채	-	-	5,000	56,827
시 도 비	89,067	32,240	-	-

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 소규모(50ha 미만) 상습침수지역 농경지 주변 배수로 설치로 침수피해 예방

142		사계~서광간 시도 21호선 확포장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 농어촌지역 주요 도로구간을 확·포장하여 지역 간 교통 접근성을 향상시키고, 주민들의 통행 안전성과 교통 편의성 제고

○ 농산물 및 생활물자 수송 여건을 개선하여 지역경제 활성화 및 정주여건 개선 도모

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 2022. 11.: 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2022. 12.: 소규모 재해영향평가 및 환경영향평가용역 완료

○ 2022. 12.: 도로구역 결정 및 보상계획 열람 공고

○ 2023. 1~8.: 편입토지 보상협의 추진

4. 사업개요

○ 기  간: 2022년 ~ 2030년 (9개년)

○ 위  치: 서귀포시 안덕면 사계리 ~ 서광리

○ 내  역: 도로 확포장(1.4km), 도로폭 B=10.0m (왕복 1차로)

○ 공정률: 공사(-) / 보상 (60.3%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		9,400	600	500	-	500	-	-	-	8,300
보상비	58필지	5,000	445	500	-	500	-	-	-	4,055
공사비	도로 확포장 (L=1.4km)	4,245	-	-	-	-	-	-	-	4,245
부대비	설계용역 등	155	155	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		9,400		600		500		8,300
보상비	58필지	5,000	16필지	445	13필지	500	29필지	4,055
공사비	도로 확포장 (L=1.4km)	4,245	-	-	-	-	도로 확포장 (L=1.4km)	4,245
부대비	설계용역 등	ᅟᅢᆼ155	설계용역 등	155	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	9,400	600	500	8,300
국 비	-	-	-	-
지 방 채	500	-	500	-
시 도 비	8,900	600	-	8,300

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍·면지역 도로망 확충으로 지역균형개발 및 주민생활 편익 도모

○ 지역간 균형개발 및 교통정체구간 해소로 물류비용 절감

143		서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 농어촌지역 주요 도로구간을 확·포장하여 지역 간 교통 접근성을 향상시키고, 주민들의 통행 안전성과 교통 편의성 제고

○ 농산물 및 생활물자 수송 여건을 개선하여 지역경제 활성화 및 정주여건 개선 도모

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 2022. 12.: 소규모 재해영향평가 및 환경영향평가용역 완료

○ 2023. 9.: 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2024. 9.~10.: 도로 노선 지정 및 보상계획 열람 공고

○ 2024. 12.~2025. 6.: 편입토지 보상협의

4. 사업개요

○ 기  간: 2022년 ~ 2030년 (9개년)

○ 위  치: 서귀포시 안덕면 동광리

○ 내  역: 도로 확포장(3.5km), 도로폭 B=12.0m (왕복 1차로)

○ 공정률: 공사(-) / 보상(3.9%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		6,200	284	500	-	500	-	-	-	5,416
보상비	77필지	3,605	189	500	-	500	-	-	-	2,916
공사비	도로 확포장 (L=3.5km)	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
부대비	설계용역 등	95	95	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		6,200		284		500		5,416
보상비	77필지	3,605	6필지	189	18필지	500	53필지	2,916
공사비	도로 확포장 (L=3.5km)	2,500	-	-	-	-	도로 확포장 (L=3.5km)	2,500
부대비	설계용역 등	95	설곙용역 등	95	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	6,200	284	500	5,416
국 비	-	-	-	-
지 방 채	500	-	500	-
시 도 비	5,700	284	-	5,416

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍·면지역 도로망 확충으로 지역균형개발 및 주민생활 편익 도모

○ 지역간 균형개발 및 교통정체구간 해소로 물류비용 절감

144		화순~서서로간 시도 35호선 확포장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 농어촌지역 주요 도로구간을 확·포장하여 지역 간 교통 접근성을 향상시키고, 주민들의 통행 안전성과 교통 편의성 제고

○ 농산물 및 생활물자 수송 여건을 개선하여 지역경제 활성화 및 정주여건 개선 도모

2. 지방채 발행계획: 500백만원

3. 추진경위

○ 2018. 1.: 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2018. 3.: 소규모 환경영향평가용역 완료

○ 2018. 4.: 교통안전진단용역 완료

○ 2018. 4~6.: 각종 행정절차 이행(산지, 계약심사, 일상감사 등)

○ 2018. 6~12.: 편입토지 보상협의

4. 사업개요

○ 기  간: 2017년 ~ 2030년 (14개년)

○ 위  치: 서귀포시 안덕면 화순리

○ 내  역: 도로 확포장(6.2km), 도로폭 B=15~30m (왕복 1차로)

○ 공정률: 공사(-) / 보상(17.1%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		15,500	800	500	-	500	-	-	-	14,200
보상비	35필지	9,300	610	500	-	500	-	-	-	8,190
공사비	도로 확포장 (L=6.2km)	6,010	-	-	-	-	-	-	-	6,010
부대비	설계용역 등	190	190	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                 (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		15,500		800		500		14,200
보상비	35필지	9,300	3필지	610	3필지	500	29필지	8,190
공사비	도로 확포장 (L=6.2km)	6,010	-	-	-	-	도로 확포장 (L=6.2km)	6,010
부대비	설계용역 등	190	설계용역 등	190	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                 (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	15,500	800	500	14,200
국 비	-	-	-	-
지 방 채	500	-	500	-
시 도 비	15,000	800	-	14,200

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍·면지역 도로망 확충으로 지역균형개발 및 주민생활 편익 도모

○ 지역간 균형개발 및 교통정체구간 해소로 물류비용 절감

145		세화~가시간 시도 45호선 확포장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 농어촌지역 주요 도로구간을 확·포장하여 지역 간 교통 접근성을 향상시키고, 주민들의 통행 안전성과 교통 편의성 제고

○ 농산물 및 생활물자 수송 여건을 개선하여 지역경제 활성화 및 정주여건 개선 도모

2. 지방채 발행계획: 1,000백만원

3. 추진경위

○ 2017. 12.: 기본 및 실시설계용역 및 소규모 환경영향평가용역 완료

○ 2022. 4.: 도로구역(변경) 결정 및 보상계획 열람 공고

○ 2023. 1.: 소규모 재해영향평가 협의 완료(도 재난대응과)

○ 2023. 4.~12.: 전체분 발주 및 1차분 공사 추진(저류지 터파기)

○ 2024. 7.~12.: 2차분 공사 추진(콘크리트 포장 L=360m, 수로관, 전석쌓기 등)

4. 사업개요

○ 기  간: 2017년 ~ 2028년 (10개년)

○ 위  치: 서귀포시 표선면 세화리 ~ 가시리

○ 내  역: 도로 확포장(0.9km), 도로폭 B=12.0m (왕복 1차로)

○ 공정률: 공사(28%) / 보상(87.3%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		7,700	4,270	1,000	-	1,000	-	-	-	2,430
보상비	20필지	4,960	3,420	1,000	-	1,000	-	-	-	540
공사비	도로 확포장 (L=0.9km)	2,580	690	-	-	-	-	-	-	1,890
부대비	설계용역 등	160	160	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		7,700		4,270		1,000		2,430
보상비	20필지	4,960	12필지	3,420	4필지	1,000	4필지	540
공사비	도로 확포장 (L=0.9km)	2,580	저류지 조성	690	-	-	도로 확포장 (L=0.9km)	1,890
부대비	설계용역 등	160	설계용역 등	160	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	7,700	4,270	1,000	2,430
국 비	-	-	-	-
지 방 채	1,000	-	1000	-
시 도 비	6,700	4,270	-	2,430

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍·면지역 도로망 확충으로 지역균형개발 및 주민생활 편익 도모

○ 지역간 균형개발 및 교통정체구간 해소로 물류비용 절감

146		신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업

1. 사업목적 또는 필요성

○ 농어촌지역 주요 도로구간을 확·포장하여 지역 간 교통 접근성을 향상시키고, 주민들의 통행 안전성과 교통 편의성 제고

○ 농산물 및 생활물자 수송 여건을 개선하여 지역경제 활성화 및 정주여건 개선 도모

2. 지방채 발행계획: 1,100백만원

3. 추진경위

○ 2013. 10.: 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 10.: 노선 지정 고시 및 보상계획 열람 공고

○ 2022. 3.:  각종 행정절차(계약심사, 일상감사 등) 이행

○ 2022. 5.: 1공구 전체분 및 1차분 착공(1공구)

○ 2023. 1.~11.: 2차분 공사 추진(1공구)

○ 2024. 7.~12.: 3차분 공사(1공구)

4. 사업개요

○ 기  간: 2013년 ~ 2027년 (15년)

○ 위  치: 서귀포시 남원읍 신례리

○ 내  역: 도로 확포장(０.7km), 도로폭 B=12.0m (왕복 1차로)

○ 공정률: 공사(50%) / 보상(93.1%)

< 사업총괄 >	(단위: 백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2026년도 계획						2027년 이후계획
				계	국 비	지방채	지방비		기타
							시도	시군구
계		5,366	3,366	1,100	-	1,100	-	-	-	900
보상비	81필지	2,750	2,250	500	-	500	-	-	-	-
공사비	도로 확포장 (L=0.7km)	2,522	1,022	600	-	600	-	-	-	900
부대비	설계용역 등	94	94	-	-	-	-	-	-	-

< 연도별·공종별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

공종별	합계		기투자		금회계획		금후계획
	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비	물량	사업비
계		5,366		3,366		1,100		900
보상비	81필지	2,750	72필지	2,250	9필지	500	-	-
공사비	도로 확포장 (L=0.7km)	2,522	도로 확포장 (L=0.4km)	1,022	도로 확포장 (L=0.1km)	600	도로 확포장 (L=0.2km)	900
부대비	설계용역 등	94		94	-	-	-	-

< 연도별·재원별 투자계획 >                                     (단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	금회계획	금후계획	비 고
계	5,366	3,366	1,100	900
국 비	-	-	-	-
지 방 채	1,100	-	1,100	-
시 도 비	4,266	3,366	-	900

5. 사업추진에 따른 기대효과

○ 읍·면지역 도로망 확충으로 지역균형개발 및 주민생활 편익 도모

○ 지역간 균형개발 및 교통정체구간 해소로 물류비용 절감