	제445회 제주특별자치도의회 임시회 제2차 본회의 2025. 12. 19.(금) 14:00

2026년도 공유재산관리계획안
(서귀포의료원 부설 노인질환전문센터 신축)

심 사 보 고 서

의안번호	2809
제안일자 및 제안자	2025. 10. 31. 제주특별자치도지사
상정일자	제444회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 (2025년 11월 24일 심사보류) 제445회 제주특별자치도의회 임시회 행정자치위원회 제1차 회의 (2025년 12월 16일 상정·의결)
심사결과	원안가결

	제주특별자치도의회
	(행정자치위원회)

2026년도 공유재산관리계획안
(서귀포의료원 부설 노인질환전문센터 신축)

심 사 보 고 서

1. 심사 경과

가. 제안일자: 2025. 10. 31.

나. 제 안 자: 제주특별자치도지사

다. 회부일자: 2025. 11. 3.

라. 상정일자

□ 제444회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

- 행정자치위원회 제3차 회의(2025년 11월 24일) 심사보류

□ 제445회 제주특별자치도의회 임시회

- 행정자치위원회 제1차 회의(2025년 12월 16일) 상정·의결

2. 제안 설명의 요지

□ 초고령화 사회 진입에 따른 고령층 인구 및 의료수요 증가에 따라 노인질환 전문의료서비스 제공 체계 구축을 통해 공공의료 기능 강화와 도내 지역 의료격차 해소를 위해 서귀포의료원 부설 노인질환전문센터를 신축하고자 하는 내용으로

□ 「지방자치법」제47조제1항제6호, 「공유재산 및 물품 관리법」제10조의2 및 같은 법 시행령 제7조, 「제주특별자치도 공유재산 관리 조례」제10조 규정에 따라 2026년도 공유재산관리계획안에 대한 의결을 얻기 위함.

3. 전문위원 검토보고 요지 (전문위원 임정현)

가. 사업개요

□ 위    치: 서귀포시 동홍동 1535-5

□ 사업기간: 2026년 1월 ~ 2029년 6월

□ 총사업비: 38,700백만원(국비 19,350백만원 / 도비 19,350백만원)

□ 사 업 량: 건물 1동 신축

□ 규    모: 연면적 7,244.77㎡ (지하 1층, 지상 3층)

층별	용도	면적	비고
지하1층	주차장(35면), 기계실 등	2,246.24㎡
지상1층	접수실, 진료실 등	1,688.25㎡	옥외주차 20면
지상2층	병원시설 (36병상), 재활치료실 등	1,688.25㎡
지상3층	병원시설 (62병상)	1,622.03㎡

□ 사업주관: 도 안전건강실 보건정책과

나. 검토의견

1) 추진배경 및 필요성

□ 서귀포시의 지역 인구는 감소 추세이나 65세 이상 노인 인구는 매년 증가하고 있어, 2021년 초고령화 사회로 기 진입함.

- 2025.10월 기준 서귀포시 지역인구 179,832명 중 65세이상 노인인구는 43,388명으로 전체 인구의 24.13%를 차지하고 있음.

- 국제연합(UN)기준 65세 이상 인구비율 20%이상 초고령화 사회로, 서귀포시는 2021년에 초고령화사회로 진입함.

- 서귀포시 지역의 노인인구 증가 추세에 따라 요양병원 연계 및 재활치료가 필요한 연계 대상 환자는 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

< 서귀포시 노인인구 (만 65세 이상) 현황 >

(단위: 명)

구 분		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.10월
서귀포시 인구 수		181,584	182,169	183,663	184,770	183,589	182,020	179,832
	노인인구 수	33,707	35,434	36,848	38,404	40,041	41,734	43,388
	비율(%)	18.6	19.5	20.1	20.8	21.8	22.9	24.13
전국 비율(%)		15.5	164.	17.1	18.0	19.0	20.0	20.58

□ 서귀포시 지역 주민들은 제주시내 또는 타 지역으로 이동해 병원을 이용하는 실정으로,

- 특히 노인 인구는 이동 취약 계층으로, 환자와 가족 모두 경제적·시간적 부담을 가중시켜 지역사회 문제로 대두되고 있으며,

- 서귀포시 지역 내에 요양병원 등 노인질환전문센터가 전무하여,
2017년부터 요양병원 건립 요구가 지속되어 온 지역주민의 오랜
숙원 사업임.

□ 서귀포의료원은 서귀포지역 책임의료기관이자 공공의료기관으로서의 역할 강화를 위해 고령환자 및 의료취약계층에 대한 진료기능 보강이 필요한 상황임.

□ 한편, 인구 1천명 당 의료기관 병상 수를 보면, 2024년 기준 전국은 13.8병상, 제주는 7.4병상으로 제주지역 병상 수가 전국 평균의 절반 수준에 불과함.

- 특히 서귀포시는 2.9병상에 그쳐 병상 수가 현저히 부족한 실정으로, 장기입원이 필요한 아급성기 환자를 수용할 추가 의료시설(병상) 확충이 필요한 상황임.

(급성기) 질병이나 증상이 짧은 기간 내에 급격하게 발생하고 증상이 심하며 빠르게 진행되는 시기

(아급성기) 중간단계, 증상이 급격하게 심했던 시기는 지났지만, 아직 완전히 회복되지 않고
증상이 지속되거나 완화와 악화를 반복하는 시기

(만성기) 질병이나 증상이 장기간에 걸쳐 지속되거나 서서히 진행되는 상태, 질환의 원인이 완전히 해소되지 않았거나 신체 구조의 영구적인 변화가 남아있을 수 있음.

□ 이에, 서귀포시의 초고령화 사회 진입에 따른 고령층 인구 증가와 의료수요 확대에 대응하기 위해 노인질환 전문 의료서비스 제공 체계를 구축하고자 하는 것으로, 사업의 필요성은 인정됨.

2) 사업의 주요내용

가) 사업 내용

□ 본 사업은 서귀포의료원 동측 인근 부지에 노인질환전문센터를 신축하기 위하여 총사업비 38,700백만원을 투입하고자 하는 것임.

□ 서귀포시 동홍동 1535-5번지에 지하 1층·지상 3층(연면적 7,244㎡) 규모의 건물 1개동을 신축하고자 하는 것으로 시설 활용계획은 아래와 같음.

< 시설물의 층별 활용 계획(안) >

구 분	면적(㎡)	활용계획
총 계	7,244.77
지하 1층	1,622.03	• 주차장(35면), 기계실 등
지상 1층	1,688.25	• 접수실, 약국, 검사실, x-ray실, 외래진료실 등 ※ 옥외 주차장 20면
지상 2층	1,688.25	• 일반병동(36병상), 재활치료실 등
지상 3층	1,622.03	• 일반병동 및 치매안심병동(62병상)

< 위치도 >

신축 부지

서귀포의료원

나) 예산 계획 및 규모

□ 총사업비는 38,700백만원(국비 50%, 도비 50%)으로,
2026년 예산안에 설계비 1,600백만원을 요구하였으나 반영되지 않았음.

- 다만, 보건복지부의 2026년 지역거점공공병원 기능보강사업의 일환으로 국비 가내시 통보를 받은 상태임.

< 예산 확보 계획 >

(단위: 백만원)

구분	계				2026년				2027년 이후
	계	국비	도비	자체 재원	계	국비	도비	자체재원	계	국비	도비	자체 재원
시설비	38,700	19,350	19,350		3,500	1,750	1,750		35,200	17,600	17,600
○ 2026년 본예산(일반회계) 3,500백만원 반영 추진(국비 1,750, 도비 1,750) ※ 2026년 지방의료원 기능보강사업으로 보건복지부 가내시 통보(2025.9.26.) ○ 2027년 본예산(일반회계) 11,108백만원 반영 추진(국비 5,554, 도비 5,554) ○ 2028년 본예산(일반회계) 11,108백만원 반영 추진(국비 5,554, 도비 5,554) ○ 2029년 본예산(일반회계) 12,984백만원 반영 추진(국비 6,492, 도비 6,492)

□ 제주공공투자관리센터에서 총사업비를 추계한 결과, 사업비는 적정하다는 의견임.

3) 행정절차 사전 이행 여부 검토

□ 행정절차 사전 이행사항은 아래와 같음.

- 중기공유재산관리계획: 반영(2025.10.)

- 중기재정계획: 반영(2025.10.)

- 투자심사: 심사(2025.11.)

※ 중앙투자심사 결과: 조건부(실시설계 후 2단계 심사 등)

4) 사업 추진계획의 타당성 및 향후 운영계획

가) 노인질환전문센터 운영계획

□ 노인질환전문센터는 일반병동 및 치매안심병동(98병상), 외래진료실을 운영할 계획이며,

- 노년내과, 재활의학과, 가정의학과, 신경과 등 4개 진료과를 개설하고, 전문의 4명, 간호사 25명 등 총 59명의 인력을 확보할 예정임.

□ 사업부서 제출자료에 따르면, 98병상 규모의 노인질환전문센터 운영 시, 필요인력 50명의 인건비와 의료수익 대비 진료재료비 14%, 관리운영비 20%의 의료비용이 발생한다고 가정했을 경우

- 병상가동률에 따른 의료손익을 추정한 결과, 병상가동률 75% 이상 시 흑자전환, 80% 이상 시 연간 약 527백만원의 수익이 발생할 것으로 보고 있음.

< 노인질환전문센터 의료손익 추정 >

(단위: 백만원)

병상이용률(가정)	의료수익	의료비용	손익
65%	7,588	7,964	△376
70%	8,191	8,265	△74
75%	8,793	8,566	227
80%	9,395	8,868	527
85%	9,997	9,169	828
90%	10,600	9,470	1,130
95%	11,202	9,771	1,431

* 보조금 및 의료 외 수익/비용을 제외한 의료 순 손익임,
병상이용률에 따른 입원수익만 추정, 의료비용 중 인건비 : 고정비

나) 노인질환전문센터 사업 추진경과

□ 도에서는 서귀포의료원 부설 요양병원 신축을 추진하고자, 2024년 11월 공유재산관리계획안을 도의회에 제출한 바 있음.

• (2024.11.) 2025년도 공유재산관리계획안(서귀포의료원 부설 요양병원 신축) 도의회 제출

• (2024.11.) 제433회 도의회 임시회(행자위) 심의결과: 심사보류

• (2025.10.) 의안 철회

□ 이후, 국비 확보 및 중앙부처 협의 과정에서 사업 방향을 ‘요양병원 신축’에서 ‘노인질환전문센터 신축’으로 변경하여 추진 중임.

- 다만, 2024년 요양병원 설립에 대한 공유재산관리계획안 심사 당시 제기되었던 부지 협소, 주차 공간 부족, 주변 교통 혼잡 발생 등의 우려사항은 여전히 해소되지 않은 상태임.

- 이에 대해, 도에서는

· (주차공간 부족 및 교통혼잡) 노인질환전문센터를 일반 외래 진료보다 타 의료기관으로부터 전원 의뢰를 통해 유입되는 입원환자 중심으로 운영될 계획으로, 일상적인 차량 유입은 제한적일 것이라는 입장이며,

· (부지 협소) 법적 한도 내에서 건축 가능한 최대 면적을 확보하고, 옥상 공간을 정원·산책로·야외 휴게 공간 등으로 조성하여 환자의 정서적 안정 및 개방감 확보에 노력하겠다는 입장임.

· (서귀포의료원과의 인접성) 현재 노인질환전문센터 설립 예정 부지는 서귀포의료원 부지와 직접적으로 인접하고 있지 않아, 향후 인접 토지주(제주대학교)와 지속 협의를 통해 토지 일부를 매입하고, 의료원과 센터를 연결하는 도로를 개설하겠다는 계획임.

※ 요양병원과 노인질환전문센터 비교: 참고 1

다. 종합 검토의견

□ 본 사업은 서귀포시 지역의 초고령화 사회 진입에 따른 고령층 인구 증가에 따라 노인질환 전문의료서비스 제공 체계를 구축하고, 공공의료 기능 강화 및 도내 지역 의료격차를 해소하기 위하여,

- 서귀포의료원 부설 노인질환전문센터를 신축하고자 하는 것으로 사업의 필요성과 타당성은 인정됨.

□ 다만, 2024년 요양병원 설립에 대한 공유재산관리계획안 심사 당시 지적되었던 부지 협소, 주차 공간 부족, 주변 교통 혼잡 등 우려 사항이 여전히 해소되지 않은 상황으로,

- 사업 추진과정에서 이러한 물리적 제약 요인에 대한 구체적 개선방안 마련이 필요하다고 판단됨.

4. 질의 및 답변요지: 생략

5. 토론요지: 생략

6. 소위원회 심사보고의 요지: 해당사항 없음

7. 수정안의 요지: 해당사항 없음

8. 심사결과: 원안가결

9. 소수의견의 요지: 해당사항 없음

10. 기타 필요한 사항: 없음

※ 「전자회의시스템 수록 원안자료 참고」

(보조자료 1)

가칭 서귀포의료원 노인질환전문센터 신축 계획

◇ 서귀포지역은 의료취약지로 고령환자 급성기 치료 인프라 전무

◇ 서귀포지역 급격한 고령화 대비 산남지역 의료서비스 격차 해소와 노인질환 수요 증가 대응

(추진 근거) 지방의료원 설립 및 운영에 관한법률 제17조(보조금 등), 공공보건의료에 관한법률 제10조(국유·공유재산의 무상대부)

□ 추진 배경

❍ 초고령화 사회 진입에 따른 고령층 인구 및 의료 수요 증가

❍ 호스피스 등 노인질환 전문의료 서비스 제공 체계 전무

❍ 급성기·아급성기·요양형 병상 혼재의 비효율적 구조 개선

- 국가통계포털 장래 인구 추계

·서귀포시:‘24년 22.9% →‘35년 32.6%(예상)

·전국 ’20년 20.0% → ‘35년 29.9%(예상)

- 고령환자 치료에 대한 급성기 2차 진료기능 강화 필요

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2026. 1. ~ 2029. 6.(3년6월)

❍ 사업위치: 서귀포시 동홍동 1535-5 (부지 3,915㎡)

❍ 사업내용: 노인질환 전문센터 신축

❍ 면적(규모): 연면적 7,244.77㎡(지하1, 지상3층)

❍ 주요시설 : 지하1층 주차장(35면) 및 기계실, 1층 접수, 진료실 등, 2층 병원시설(36병상), 3층 병원시설(62병상)   *옥외주차 20면

❍ 총사업비(안): 447억원*(국비 193.5억 원, 도비 243.5억 원)    (단위: 억 원)

구 분	총사업비	기투자	2026년	향후투자	비고
계	447	60	35	352
국 비	193.5	0	17.5	176
도 비	253.5	60	17.5	176

*총사업비: 447억 = 건물신축 387억 + 토지매입비 60억(기투자)

□ 추진사항

□ 초고령사회 대비 서귀포의료원 진료 수준 향상을 위한 중장기 발전 방안 토론회 개회: 2022. 10. 17.

□ 서귀포의료원 부설 병원 부지 매입: 2023. 6.

□ 서귀포의료원 부설 노인질환전문센터 신축 사업계획서 제출(보건복지부): 2025. 4.

□ 보건복지부 기능보강사업 계획서 발표 참석: 2025. 7.

□ 보건복지부 기능보강사업 선정 평가 발표 참석: 2025. 9.

□ 보건복지부 기능보강사업 대상자 선정 결과 발표: 2025. 9. ※ (보조자료 3) 참고

□ 운영계획

□ 운영방식: 서귀포의료원에 공유재산 무상사용 허가 및 서귀포의료원 운영

(추진 근거) 지방의료원 설립 및 운영에 관한법률 제17조(보조금 등), 공공보건의료에 관한법률 제10조(국유·공유재산의 무상대부)

□ 진료과목: 노년내과, 재활의학과, 가정의학과, 신경과 등

❍ 인력충원: 추가 인력 59명 증원(의료인력 50, 시설안전인력 9)

구분	계	원장	의사직	약사직	간호직	보건직	의료 기술직	행정/시설직	기능직	공무직
현재 정원	471	1	44	5	246	68	9	25	44	29
추가 인력	59	-	4	1	35	-	8	11	-	-
총인력	530	1	48	6	281	68	17	36	44	29

(의료·원무 인력 충원 계획) 총 50명

·의사 4명(내과, 재활의학과, 가정의학과, 신경과), 간호사 25명, 간호조무사 10명, 약사 1명, 물리치료사 3명, 작업치료사 2명, 의료기사 2명, 사회복지사 1명, 행정(원무) 2명

(시설물안전관리인력 충원계획) 총 9명

·시설관리팀장 1명, 시설관리 3명(전기안전관리자, 소방안전관리자, 위험물안전관리자), 미화 5명

□ 안전사고 취약시설 안전점검 정례화로 사고예방 관리체계 구축

-　월 1회 안전점검

- 년 1회 정기점검 및 3년마다 정밀안전진단(외부 전문기관)

❍ 에너지 절감 친환경 구축설비 설치

- 태양광 발전설비, LED 조명 설비(조명 자동제어), 대기전력 차단콘센트 및 일괄 소등 스위치

□ 추진일정

□ 지방재정투자사업 중앙심사 심의: 2025. 11.~ 12.

□ 시설 마스터플랜 수립: 2026. 2.

□ 설계 계약: 2026. 3.

□ 기본설계 심의: 2026. 6.

□ 교통영향 평가 등: 2026. 9.

□ 조달청 설계 적정성 검토: 2027. 2.

□ 공사계약 체결: 2027. 6.

□ 착공: 2027. 9.

□ 준공: 2029. 6.

□ 기대효과

❍ 초고령화 추세 대비 지역의료 수요 대응 전문적인 의료서비스 제공 체계 마련

❍ 급성기 및 아급성기 노인환자에 대한 적극적인 치료를 통한 노인보건의료서비스 수준 향상

(보조자료 2) 노인질환전문센터 신축 부지 위성사진

신축 부지

서귀포의료원

참고 1		요양병원과 노인질환전문센터 비교

□ 요양병원

- 「의료법」‘요양병원’기관으로, 「장애인복지법」 제58조 제1항 제4호 시설(장애인 의료재활시설: 장애인을 입원 또는 통원하게 하여 상담, 진단ㆍ판정, 치료 등 의료재활서비스를 제공하는 시설)을 갖추고 입원 치료 및 간호·재활 등의 의료서비스 제공

-  만성질환자, 중풍·치매·고령으로 일상생활이 어려운 노인의 장기치료 및 요양

□ 노인질환전문센터

- 「의료법」‘병원 또는 종합병원’ 형태 기관으로 치매, 중풍, 파킨슨병, 골관절계 등 노인성 질환 또는 각종 노인 관련 만성질환을 전문적으로 진단·치료·관리하는 진료기관

- 입원형 병원 형태뿐 아니라 외래진료, 집중검진, 상담·재활프로그램 등을 병행

- 장기 입원 요양을 비롯한 전문 진료 + 케어 + 재활지원 등 복합적 기능

구분	요양병원	노인질환전문센터
관련근거	｢의료법｣ 제3조제2항제3호 라목 ｢장애인복지법｣ 제58조제1항제4호에 따른 의료재활시설로서 제3조의2 요건을 갖춘 의료기관	｢의료법｣제3조제2항제3호 가목 또는 바목
주요 목적	입원 + 요양 + 간호·재활	입원 + 전문 진단·치료 + 재활·유지관리
기관 형태	병원형 의료기관(입원 중심)	전문 진료기관 + 센터형(입원·외래 병행)
대상 환자	일상생활이 상당히 어려운 만성질환자 등	노인성 질환이 발생했거나 진행 가능성이 있는 환자, 또는 치료 후 유지관리 대상
비용	요양병원수가 적용	요양병원수가 미적용
선택 기준	의료·간호적 처치가 긴요한 경우	치료 초기 또는 유지관리 단계, 또는 전문 질환관리가 필요한 경우

참고 2		서귀포의료원 일반현황

□ 직원현황

(2025년 9월 30일 기준, 단위 : 명)

구 분	계	원장	의사직	약사직	간호직	보건직	사무직	기능직	기술직	공무직
정 원	489	1	46	5	258	70	27	44	9	29
현 원	452	1	42	0	237	68	25	42	9	28
결 원	△37	-	△4	△5	△21	△2	△2	△2	-	△1

※ 공중보건의 4명(안과, 치과2, 일반의),파견의4명은 제외

□ 진료과목 : 내과 등 19개과, 전문의 48명

(2025년 9월 30일 기준, 단위 : 명)

진료과목명	내과	외과	산부인과	소아청소년과	정형외과	신경외과	흉부외과	정신건강의학과	신경과	이비인후과	비뇨의학과	마취통증의학과	영상의학과	진단검사의학과	재활의학과	가정의학과	안과	응급의학과	치과
48	9	4	3	3	3	3	1	1	2	1	1	3	3	1	1	1	1	6	1

□ 시설규모

□ 건물면적: 49,024.78㎡

구 분	층 수	면 적	건축년도	용 도
본 관	지상4층/지하2층	25,034.68㎡	2013년	․ 외래, 병동, 원무과 ․ 응급의료센터 증축(2019년) ․ 리모델링 및 증축(2025년)
신 관	지상4층/지하2층	16,284.80㎡	2025년	․ 원스톱 건강검진센터 ․ 재활치료실 ․ 정신병동
별 관	지상5층/지하1층	3,728.63㎡	1999년	․ 어린이집, 산후조리원, 간호기숙사, 행정업무시설, 대회의실, 세미나실 등
장례식장	지상2층/지하1층	1,559.72㎡	2005년	․ 분향소 및 접객실
빈 소 휴게시설	지상1층	154.05㎡	2018년	․ 휴게시설
서원 기숙사	지상6층/지하1층	1,830.3㎡	2018년	․ 의사 숙소(24세대)
대경주택	지상3층	432.6㎡	1998년	․ 의사 숙소(5세대)

※ 주차면 : 412면 → 지하 293면(장애인17면, 임산부5면), 지상 119면 (장애인 9면)

□ 허가병상수 :  88실 296병상

구 분	계	1인실	2인실	4인실	5인실	ICU	음압격리
병 실	88	26	2	32	24	4	-
병 상	296	26	4	128	120	18	-

□ 주요 의료시설

의료시설	비 고
응급의료센터	․ 병 상 : 25병상 ․ 전담인력 : 44명 (의사 9, 간호사 25, 응급구조사7,기타3) ․ 보유장비 : 심장충격기, 심전도기, 인공호흡기 등
중환자실	․ 병 상 : 18병상(음압격리병상3병상 포함) ․ 장 비 : 인공호흡기, CRRT, 후두경 등
심․뇌혈관센터	․ 장 비 : 혈관조영촬영장치외 9종
인공신장실	․ 병 상 : 28병상 운영
건강검진센터	․ 종합건강증진센터(장애친화 건강검진센터 포함) ․ 내시경실 2실(회복실 8병상) ․ 보유장비 : CT, 디지털 유방촬영장치, 폐기능검사기 등
고압치료센터	․ 복실감압챔버 1기(최대 6기압 유지, 3인용)
소화기내시경센터	․ 4개실 전자내시경(위·대장), ERCP
분만․신생아실	․ 태아감시장치 3대, 보육기 4대 외 의료장비

□ 주요 부대시설

의료시설	비 고
산후조리원	․ 산모실 13실, 유아실 1실(바시넷 13개), 수유실 1실, 건강관리실 1실
직장어린인집	․ 보 육 실 : 3실, 최대 15명 수용 (보육교사 4명)
장례식장	․ 영안실 : 14구 안치 가능 ․ 분향소(4실) / 접객실(3실) / 빈소 휴게시설(4실)
간호사기숙사	ㆍ 8실 최대 16명 수용

□ 의료장비 : MRI, CT 등 총 354종 1,896점

□ 주요 의료장비

장비명	수랑(대)	장비명	수랑(대)
MRI	1	이동형음압기	29
CT	3	혈관조영촬영기	1
심장초음파촬영기	2	인공신장기	29
CRRT(지속적신대체요법)	3	초음파영상진단기	15
DR(일반촬영기)	6	골밀도측정기	2

□ 진료 현황

□ 환자진료

(2025년 9월 30일 기준, 단위 : 명, %)

구 분	2025년 계획			2025년 실적			계획대비 달성율
	계	외래 (실인원)	입원 (연인원)	계	외래 (실인원)	입원 (연인원)	계	외래 (실인원)	입원 (연인원)
계	540,900	443,808	97,092	222,618	168,351	54,267	41	38	56
건강보험	330,120	253,416	76,704	160,225	118,192	42,033	49	47	55
의료급여	55,932	41,496	14,436	24,515	15,970	8,545	44	38	59
기타환자	154,848	148,896	5,952	37,878	34,189	3,689	24	23	62

※ 기타환자: 산재,자보,보훈,일반 등

□ 응급환자

(2025년 9월 30일 기준, 단위 : 명, %)

구 분	2024년		2025년9월		월평균 증감률
	전체	월평균	전체	월평균
총환자수	27,750	2,313	20,267	2,252	△2.64%
입원환자수	3,483	290	2,626	292	0.69%
입원비율	12.6%		13%		3.17%
전원비율	2.0%		2.0%		-

□ 건강검진

(2025년 9월 30일 기준, 단위 : 명)

구 분	2024년		2025년9월		월평균 증감률
	전체	월평균	전체	월평균
계	22,374	1,865	12,697	1,410	△24.4%
일반검진	7,367	614	4,189	465	△24.3%
암검진	12,524	1,044	7,363	818	△21.6%
학생검진	2,283	190	970	108	△43.2%
종합검진	200	17	175	19	11.8%

□ 운영 수지 현황(‘25. 9.30. 기준)

(단위: 백만원)

구분	2023년			2024년			2025. 9. 30.
	수 입	지 출	손 익	수 입	지 출	손 익	수 입	지 출	손 익
계	50,495	62,507	△12,012	59,915	67,101	△7,186	45,874	52,195	△6,321

※ ‘25년도 수지현황은 예산손익(감가상각비, 퇴직급여충당금전입액 미포함) 가결산 금액