제446회 제주특별자치도의회 임시회

농수축경제위원회

2026년 주요 업무 보고

2026. 2.

제주에너지공사

보고순서

	Ⅰ	일반현황
	Ⅱ	정책목표와 전략
	Ⅲ Ⅲ	2026년 핵심과제
	Ⅲ Ⅳ	2026년 주요업무 계획
	Ⅳ Ⅴ	2025년 행정사무감사 지적사항 처리결과 31

Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅰ. 일반현황

1		기구 및 정‧현원

❋ 기 구 : 1실 2처 1센터 9부

❋ 인력 : 정원 73명 / 현원 62명

*기준일 : 2025. 12. 31.

구분	계	사장	일반직						공무직
			1급	2급	3급	4급	5급	6급
정원	73	1	-	4	9	53			6
현원	62	1	0	1	6	10	20	19	5

※ 총 10명 채용 진행 중 (임용예정일: 26년 2월 말~ 3월 초)

2		부서별 주요업무

부 서		주 요 업 무
혁신 경영실	ESG기획부	❍ 재무관리, 예산관리, 성과관리, 조직운영 ❍ 대외협력, 사규관리, ESG경영전략, 사회공헌 등
	인사혁신부	❍ 인사관리, 보상관리, 역량개발 ❍ 기업홍보, 노경상생
	총무부	❍ 회계결산, 계약관리, 지출업무, 재산 및 물품관리, 보건관리 ❍ 정보화, 복리후생, 경영지원, 고객만족 등
그린 에너지 발전 사업처	관리기관 운영부	❍ 공공주도2.0 관리기관 운영 ❍ MW급 부유식 해상풍력 과제 수행
	청정에너지 개발부	❍ 한동평대, 보롬왓 등 공공주도 육·해상풍력 개발사업 추진 ❍ 동복·북촌풍력발전단지 확장사업, 리파워링 등 추진 ❍ 태양광 발전사업
	발전운영 사업부	❍ 신재생에너지 발전설비 운영·관리 ❍ 발전단지 안전관리 총괄
미래 에너지 사업처	분산에너지 사업부	❍ 분산형 에너지 자원(BESS, EVC 등) 활성화 사업 및 운영관리 ❍ 디지털 플랫폼 사업(PPA, VPP 등) 추진
	청정수소 사업부	❍ 청정수소 생산설비 상용화 및 안정적 운영 ❍ 청정수소 생산·저장 설비 인프라 확충 사업 ❍ 신재생에너지 홍보관 운영
청정에너지연구센터		❍ RE100 수소단지, 12.5MW그린수소, P2H실증사업 연구 과제 수행 ❍ 수소경제 육성 기본계획 용역 참여 등의 도 에너지 정책 컨설팅 수행
열린감사부		❍ 감사·감찰, 안전관리, 청렴□윤리경영 등

3		재정 및 시설 현황

❍ 자본금 : 1,331억 원 (제주특별자치도 현물출자 100%)

수권자본금		설립자본금		납입자본금
500,000백만 원		8,063백만 원		133,153백만원

※ ΄12. 11. 김녕, 가시리 풍력발전단지 현물출자로 583억 원 증자

※ ΄19. 11. 공사 풍력발전단지 인근 토지 현물출자로 643억 원 증자

※ ΄25.  4. 북촌변전소 내 MTR#2 현물출자로 25억 원 증자

❍ 최근 5개년 재무구조

(단위 : 백만 원)

연 도	자 산	부 채(A)	자 본(B)	차입 부채 (누적액)	부채비율 (A/B, %)	비 고
2020년	166,254	22,924	143,330	21,250	15.99
2021년	162,214	18,219	143,994	15,938	12.65
2022년	165,105	14,880	150,225	10,624	9.91
2023년	157,241	7,434	149,807	5,312	4.96
2024년	146,499	2,492	144,007	0	1.73

❍ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

수 입				지 출
구분	2026년	2025년	2024년	구분	2026년	2025년	2024년
합계	35,215	33,371	35,163	합계	35,215	33,371	35,163
상품판매수익	19,563	20,459	17,050	행정운영활동	8,406	8,077	7,780
				재생에너지사업	8,106	6,531	6,500
대행사업수수료수익	172	241	122
				탄소중립사업	5,638	7,945	5,905
기타영업수입	10	20	50
				국책,대행사업	6,981	3,732	3,217
이자수익	197	39	249
				소통강화·조직활성화	64	58	56
기타영업외수익	3,085	6,089	4,449
유동부채수입	6,957	3,652	3,732
				영업외활동	1,577	1,717	1,713
대여금회수수입	1,085	-	-
				재무활동	-	-	5,312
자본잉여금수입	2,485	2,820	1,300
				예비비	4,443	5,311	4,680
순세계잉여금	1,661	51	8,211

※ 각 년도 별 최종예산 기준

❍ 신재생에너지 시설 현황                  *기준일 : ΄25. 12. 31.

구 분			규 모	준공년도
풍력 발전	계		59,530㎾(39기)
	행 원		7,88㎾(7기)	2000년 ~ 2013년
	행원 연안실증		4,200㎾1기)	2024년
	신 창		1,700㎾(2기)	2006년
	김 녕		750㎾(1기)	2010년
	가 시 리		15,000㎾(13기)	2012년
	동복·북촌		30,000㎾(15기)	2015년
태양광 발전	계		2,500㎾
	행 원		415.2㎾(1식)	2010년
	제주종합경기장		490㎾(1식)	2016년
	교 래		496.8㎾(1식)	2018년
	홍보관주차장		99.7㎾(1식)	2018년
	수 산		998.4㎾(1식)	2022년
ESS 시설	계		232,338㎾h
	동복·북촌		18,000㎾h(1식)	2016년
	가 시 리		9,000㎾h(1식)	2016년
	홍보관주차장		221㎾h(1식)	2018년
	북촌(SPC)		205,117㎾h(1식)	2025년
EV 충전 설비	전기버스		17기(200㎾급), 1기(240㎾급)	2025년
	공영주차장	제주시	10기(50㎾급)	2025년
		서귀포시	4기(50㎾급)
	공공 임대주택	제주시	5기(7㎾급)	2025년
		서귀포시	4기(7㎾급) 1기(50㎾급)
송전 선로	계		32.42㎞
	행원 ~ 성산변전소		24.5㎞	2003년
	가시리 ~ 표선변전소		6.15㎞	2012년
	동복 ~ 조천변전소		1.77㎞	2015년

❍ 신재생에너지홍보관 운영 현황

- 위치: 제주시 구좌읍 해맞이 해안로 712-3 일원

- 사업비: 70억원(국비 36억 원, 지방비 24억 원, 기금 10억 원)

- 규모: 건축물 1,719㎡(연면적 2,467㎡,지상 2층)/부지 25,306㎡

- 주요시설: 신재생에너지 홍보시설, 교육공간, 4D영상관, 에너지 소통공감카페 등

Ⅱ. 정책목표와 전략

Ⅱ. 제주에너지공사 중장기 전략체계

미션

분산에너지 수용 확대 및 청정에너지 전환을 통한 제주 탄소중립 실현 기여

비젼

청정에너지로 에너지 전환을 선도하는 친환경 에너지 공기업

경영

슬로건

공공주도의 재생에너지 보급과

지속가능한 에너지 신산업을 이끌 제주에너지공사

핵심가치

및

경영방침

1		튼튼성장				2		도전혁신				3		소통화합				4		지역활력
	안정적 경영기반으로 지속성장 체계 고도화						역량개발 및 기술혁신으로 조직 경쟁력 강화						직원이 참여하는 경영혁신으로 행복한 조직문화 조성						에너지 거버넌스 활성화를 통한 지역 경제 활성화

경영목표

	재생에너지 사업 적기 추진				청정수소 생태계 구축				분산에너지 신산업 기반 조성				직원이 참여하는 경영혁신

전략과제

	공공주도 육·해상 풍력사업 고도화				청정수소 생산·저장 인프라 상용화 추진				분산에너지 계통 인프라 구축				혁신적인 경영성과 관리체계 도입
	태양광 발전 개발사업 추진				청정수소 생산·저장 인프라 구축 실증사업 추진				신규 유연성 자원 개발사업 추진				유관기관 협업을 통한 효율적 경영기반 구축
	노후 발전단지 리파워링 및 운영관리 고도화				청정수소 공급 안정화를 위한 신사업 모델 발굴				DX(디지털전환) 활용 신사업 추진				직원이 행복한 조직문화 조성

Ⅲ. 2026년 핵심과제

Ⅲ. 2026년 핵심과제

1		재생에너지 중심 에너지대전환 실현

□ 공공주도 육·해상 풍력개발사업294MW급 추진 가속화

ㅇ 서부해상181MW 공모 개시 및 탐라해상확장72MW 참여를 통한 풍력자원의 공공적 관리 향상

ㅇ 속도감 있는 육상동복확장 20MW·보롬왓 21MW풍력개발사업 추진으로 풍력산업 및 지역경제 활성화

□ 풍력자원의 공공적 관리 강화로 발전지구 운용 고도화

ㅇ 기존 민간풍력단지 지구 확대 및 설비용량 증설에 공사가 지분투자 등 공공주도2.0 정책 실현

ㅇ 공사 소유 풍력발전단지 적기 리파워링행원풍력 2.3MW으로 발전량 증대

□ 공공시설 등 활용 태양광 발전사업 확대

ㅇ 도내 공공기관 주차장 등 유휴공간을 활용한 태양광 PPA 사업모델 발굴로 RE100 이행 기반 마련 및 재생에너지 보급 확산

2		분산에너지 신산업 기반 조성

□ VPP플랫폼 기반 제주 최대 전력중개사업자로 도약

ㅇ 분산에너지 및 유연성 자원 확대를 위해 26년 전력중개시장 참여 실시

ㅇ 중개거래 자원 단계적 확대: 공사 소유 태양광 (1.5MW)완료→ 풍력 (30MW)추진중

□ 분산에너지 인프라 개발 및 유연성 확보

ㅇ 공영주차장 기반 독립형ESS, PV, EVC 인프라 구축 후 전력중개사업과 연계한 융복합 사업 모델 발굴 및 확대

ㅇ 재생에너지 수용성 확대를 위한 EV(전기버스) 충전인프라 20기(8기 확정) 구축 및 신규 EV 충전인프라 구축 대상지 발굴, 사업성 분석 실시

ㅇ 도내 제조업 분야 P2H 실증 국책과제 기획 및 공모 참여

3		청정수소 생태계 구축

□ 행원 3.3MW 청정수소 생산설비 안정적 운영

ㅇ 3.3MW 수소 생산설비 중고장 대비 수소저장탱크 확보를 통한 안정적 청정수소 공급체계(연간 70톤) 마련

ㅇ 운영효율성 증대를 통한 비용 절감으로 단계적 경제성 확보

- 전력 피크 관리, 경쟁입찰을 통한 운송비 절감 등 방안 강구

□ 청정수소 생산·공급체계 확대3.3MW→20MW

ㅇ 국내 최초 그린수소 상업운전을 기반으로 도·정부 정책과 연계 강화

ㅇ 기후부 연구과제 연계 장기 수소 저장시설 구축 및 국비 확보 추진

ㅇ 수소 경제 활성화를 위한 도내기업 육성

- 청정수소 생산·운송·공급 등 전주기 수소 생태계 구축 시 도내 기업 참여기회 제공

- 수소 생산시설 및 충전소 운영에 대한 전문가 교육 실시

4		에너지 민주주의 실현을 위한 공사 선도 역할 및 전략

□ 도민 참여 기반 에너지거버넌스 구축

ㅇ 제주 에너지산업 활성화를 위한 제도개선 발굴, 신사업 제안, 바람 연금방안(가칭: ᄄᆞᄄᆞᆺ허고 산도롱한 에너지 연금) 등 도내 기관/기업, 전문가, 도민이 참여하는 거버넌스 출범 및 운영

ㅇ 도정정책 홍보 및 정책 토론회 등 에너지 아카데미(대행사업) 운영 확대

□ 제주 에너지산업 활성화를 위한 20대 제도개선 발굴

ㅇ 재생에너지 및 전력 新 사업의 원활한 추진을 위한 20대 제도개선*과제 발굴

* 리파워링 패스트트랙, V2G 전력시장 참여 허용, SMP와 REC 분리거래 허용, 그린 히트펌프 인센티브 제도, 공사 출자한도 상향 등

ㅇ 관계기관(기후부, 道, 한국전력공사 등)에 제도개선 건의 및 협의 진행

Ⅳ. 2026년 주요업무 계획

Ⅳ. 2026년 주요업무 계획

1.	재생에너지 사업 적기 추진 및 발전시설 운영 고도화
	- 공공주도2.0 추자 / 서부 해상풍력사업	19
	- 한동·평대 해상풍력 사업	20
	- 동복풍력 발전단지 확장사업	21
	- 행원(보롬왓) 육상 풍력사업	22
	- 디지털 혁신 등 고도화로 안정적 설비 운영 및 최적화	23
2.	분산에너지 신산업 기반 조성
	- 재생에너지 수용성 확대를 위한 EV 충전인프라 구축	24
	- DX(디지털전환) 기반 전력중개사업 확대 추진	25
	- [국책사업] 제조업 RE100 달성을 위한 P2H 보급 사업	26
3.	청정수소 생태계 구축
	- 3.3MW 청정수소 생산시설 운영	27
	- [국책사업] 5MW급 플랜트형 PEM 수전해 시스템 개발사업	28
	- [국책사업] 12.5MW 재생에너지 연계 대규모 그린수소 개발	29
	- [국책사업] RE100 기반 수소 시범단지 인프라 기술 개발	30

1		재생에너지 사업 적기 추진 및 발전시설 운영 고도화

	❍ 공공주도 해상풍력 첫 모델 가시화를 위한 사업 시행 단계 진입 ❍ 풍력자원의 공공적 관리와 개발이익 공유화로 지역경제 활성화		S`
	추진 목표	·(추자해상) 공모 2단계 평가 및 안정적 사업 추진상황 모니터링 ·(서부해상) 사업희망자 공모 실시 및 우선협상대상자 선정 추진 ·(한동·평대) 전기사업허가 취득 및 상세설계 추진 ·(동복확장) 풍력발전지구 지정 및 도시계획시설 결정 추진 ·(보 롬 왓) 사업자 공모 및 선정, 사업시행협약 체결 ·(운영관리) 권역별 통합 상주·야간 관제 도입 및 중고장 발전기 복구

공공주도2.0 추자 / 서부 해상풍력사업

□ 추진방향

ㅇ 공모를 통해 재무적·기술적 능력을 갖춘 사업희망자 선정

ㅇ 지속적인 마을 소통을 통해 지역갈등 예방 및 안정적 사업 추진

□ 사업개요

ㅇ 사업규모: 약 2,551MW급(사업우선순위(1차) 2개소) ※ 사업희망자가 제안

- (추자해상) 약 2,370MW급 / (서부해상) 약 181MW급

ㅇ 주요내용: 공공주도2.0 공공성 사전검토 단계 이행

□ 추진상황

ㅇ 풍력자원 공공적 관리기관 지정(道⟶공사): ‵23. 12. ~ ‵28. 12.

ㅇ 공공주도2.0 풍력자원개발 기본계획 수립: ‵24. 5.

ㅇ 사업우선순위(1차) 2개소 확정 및 결과 제출(공사⟶道): ‵24. 10.

ㅇ 사업우선순위(1차) 주민수용성 확보(1구역: ~ ‵25. 3., 2구역: ~ ‵25. 2. / 총회 찬성)

ㅇ 공공주도2.0 1차 사업개발계획(안) 승인: ‵25. 7.

ㅇ 추자 해상풍력(가칭) 사업희망자 공모 절차 이행: ‵25. 7. ~

ㅇ 서부지역 인접마을 사업참여 검토 및 지역갈등 예방 실시: ‵25. 12.

ㅇ 서부 해상풍력(가칭) 공모 계획 수립 및 공모지침서(안) 마련: ‵26. 1.

□ 추진계획

ㅇ 서부 해상풍력(가칭) 사업희망자 공모 실시: ‵26. 2.

ㅇ 서부 해상풍력(가칭) 공모 평가 및 우선협상대상자 선정: ~ ‵26. 9.

ㅇ 추자 해상풍력(가칭) 우선협상대상자 선정 및 안정적 사업 관리: ‵26. 3. ~

한동·평대 해상풍력사업

□ 추진방향

ㅇ 전기사업허가 취득 및 계통연계 협의로 계통 불확실성 해소

ㅇ 어업피해 영향조사 및 개발인허가 협의, 상세설계 적기 추진

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: (개발) ‵16. 1. ~ ‵26. 12. (건설) ‵27. 1. ~ ‵29. 6.

ㅇ 사업위치: 제주시 구좌읍 한동리·평대리 일원(해상)

ㅇ 총사업비: 약 5,900억 원  ※ 공사 59억 원 출자 예정, 지분율 10% (타인자본 5,310억 원)

ㅇ 사업규모: 약 110㎿급

□ 추진상황

ㅇ 사업자 공모 및 우선협상대상자(동서발전 컨소시엄) 선정: ‵23. 5. ~ 10.

ㅇ 우선협상대상자 협상 및 사업시행협약 체결: ‵23. 10. ~ 12.

ㅇ 공동개발협약(JDA) 체결(‵24. 11.) 및 초기 SPC(특수목적법인) 설립(‵25. 6.)

ㅇ 개발사업 시행승인 신청기한 연장(기한: ‵27. 7. 31.): ‵25. 7.

ㅇ 한국에너지공단 25년 상반기 고정가격계약 입찰 선정: ‵25. 9.

ㅇ 경관위원회 사업계획 변경 사항(기자재, 배치 등) 심의 완료(원안의결): ‵25. 9.

ㅇ 전기사업허가 신청서 보완 및 제출: ‵26. 1.

□ 추진계획

ㅇ (공사) SPC 출자재원 마련 및 출자: ~ ‵26. 9.

ㅇ (SPC) 현지조사 및 상세설계: ~ ‵26. 12.

ㅇ (SPC) 전기사업허가 및 개발사업시행승인 완료: ~ ‵26. 12.

ㅇ (SPC) 건설공사 착공 및 준공/상업운전 개시: ‵27. 1. ~ ‵29. 6. / ‵29. 6.~

동복풍력 발전단지 확장사업

□ 추진방향

ㅇ 풍력발전지구 지정(변경) 및 도시계획시설 고시 등 신속한 인허가 완료

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: (개발) ‵21. 12. ~ ‵26. 12. (건설) ‵27. 1. ~ ‵27. 12.

ㅇ 사업위치: 제주시 구좌읍 동복리 산 56번지(공유지) 일대

ㅇ 총사업비: 약 410억 원

ㅇ 사업규모: 약 20MW급(기존 시설: 30MW)

□ 추진상황

ㅇ 동복리 마을총회 사업 승인: ‵22. 5.

ㅇ 기본 및 실시설계용역 착수: ‵23. 6.

ㅇ 제24-1차 도 경관위원회 심의 완료(조건부 의결): ‵24. 1.

ㅇ 산지전용타당성조사 및 문화재청 협의(문화재지표조사) 완료: ‵24. 2.

ㅇ 공유재산 영구시설물 축조 도의회 동의(원안가결) 완료: ‵24. 2.

ㅇ 구좌읍 공유재산(일반재산) 대부계약 체결 완료: ‵24. 5.

ㅇ 소규모 환경영향평가 변경협의 용역 계약 및 착수: ‵24. 10.

ㅇ 풍력발전 지구지정(변경) 신청: ‵24. 12.

ㅇ 지구지정(변경) 신청 보완요구에 따른 보완 자료 제출 완료: ‵25. 4.

ㅇ 지구지정(변경) 주민열람공고 의견수렴 및 조치계획 제출: ‵25. 7. ~ ‵25. 9.

ㅇ 道 현장실사팀 민원 의견수렴 및 현장 확인: ‵25. 12.

□ 추진계획

ㅇ 풍력발전지구 지정(변경) 심의(~ ‵26. 2.) 및 도의회 동의(~ ‵26. 7.)

ㅇ 도시계획시설결정(변경) 심의 및 고시: ~ ‵26. 8.

ㅇ 소규모 환경영향평가 협의 추진: ~ ‵26. 11.

ㅇ 전기사업허가 및 개발사업시행 승인: ~ ‵26. 12.

ㅇ 건설공사 착공 및 준공: ‵27. 1. ~ ‵27. 12.
행원(보롬왓) 육상 풍력사업

□ 추진방향

ㅇ 사업자 공모를 통해 공정성 확보 및 사업수행 능력을 갖춘 검증된 사업자 선정

ㅇ 대표사업자와 사업시행협약을 통해 이익공유 및 지역경제 활성화 근거 마련

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: (개발) ‵16. 1. ~ ‵27. 7. (건설) ‵27. 8. ~ ‵29. 2.

ㅇ 사업위치: 제주특별자치도 구좌읍 행원리 산 30번지 일원

ㅇ 총사업비: 약 660억 원 ※ 공사 약 52억 원 출자 예정, 지분율 49% (타인자본 약 554억 원)

ㅇ 사업규모: 약 21MW급

□ 추진상황

ㅇ 도 경관위원회 심의 및 문화재청 지표조사(변경) 협의 완료: ‵20. 3.

ㅇ 풍력발전지구 지정 도의회 동의 및 고시: ‵21. 4.

ㅇ 소규모환경영향평가서 협의 완료: ‵21. 9.

ㅇ 산지에서의 구역 등의 지정 협의 및 재해영향성검토서(행정단계) 협의 완료: ‵21. 12.

ㅇ 도시관리계획(도시계획시설: 전기공급설비) 결정 고시 완료: ‵23. 8.

ㅇ 사업자 공모 기본계획(안) 수립(‵23. 12.) 및 사업자 공모지침서(초안) 마련(‵24. 1.~4.)

ㅇ 행원리 내부 현안 해소(‵24. 4.~‵25. 1.) 및 사업자 공모 관련 주민 의견수렴 완료(‵25. 2.~6.)

ㅇ 사업자 공모 계획(안) 道 협의 완료: ‵25. 11.

ㅇ 사업자 공모지침서(초안) 보완(‵25. 7.~12.) 및 법률검토 완료(‵25. 12.)

ㅇ 사업자 공모 사전설명회 공고(‵25. 12.) 및 개최(‵26. 1.)

□ 추진계획

ㅇ (공사) 사업자 공모 공고 및 우선협상대상자 선정: ~ ‵26. 6.

ㅇ (공사) 사업시행협약 협상 및 협약 체결: ~ ‵26. 7.

ㅇ (SPC) 전기사업허가 및 개발사업시행 승인: ~ ‵27. 7.

디지털 혁신 등 고도화로 안정적 설비 운영 및 최적화

□ 추진방향

ㅇ 예방정비, 정기점검 및 상태진단으로 최적의 설비상태 유지

ㅇ 운영체계 개선으로 제주시범사업 경쟁력 확보 및 수익성 향상

ㅇ DX(디지털 전환) 활용 운영플랫폼 및 운영 기술 고도화

ㅇ 재해재난훈련 및 안전보건협의체 운영으로 사업장 안전관리 강화

□ 주요내용

ㅇ 체계적인 발전설비 운영관리로 안정적인 매출 확보

ㅇ 권역별 풍력·태양광 통합 유지보수 및 야간 관제 도입으로 발전량 증대

ㅇ 중고장 2기(동복 2호기, 가시 4호기) 적기 복구로 전체 설비 정상화

ㅇ 제주시범사업 대응력 강화를 위한 운영체계 개선 및 원격 시스템 구축

ㅇ 무재해 달성을 위한 안전보건협의체 ․ 중대재해예방위원회 운영

□ 추진상황

ㅇ 중고장 대응 강화를 위한 자체 매뉴얼 수립: ‵25. 3.

ㅇ 행원 4호기, 동복 1호기 중고장 복구 완료: ‵25. 4. ~ 8.

ㅇ 안전보건협의체·중대재해예방위원회(12회) 개최: ‵25. 1. ~ 12.

ㅇ 북촌변전소 계통감시 SCADA 및 전력감시시스템 기능 개선: ‵25. 12.

□ 추진계획

ㅇ 풍력·태양광 권역별 통합 상주 및 야간 관제 도입: ‵26. 2. ~

ㅇ 동복 2호기, 가시 4호기 중고장 복구: ‵26. 3. ~ 7.

ㅇ 전력설비 통합운영관리 및 발전망 원격제어 시스템 구축: ‵26. 2. ~ 12.

ㅇ 안전보건협의체 및 중대재해예방위원회 운영: ‵26. 2. ~ 12.

2		분산에너지 신산업 기반 조성

	❍ 新전력시장에 대응하기 위한 제주형 분산에너지 사업모델을 발굴하여 출력제어 완화와 잉여전력을 활용한 신성장 동력 확보
	추진 목표	·(EVC 구축) EV 충전기 20기 구축 1) Electric Vehicle Charging Service의 약자로, 전기차 충전사업을 말함 ·(전력중개사업 추진) VPP를 활용한 전력중개사업 확대 추진 ·(P2H 국책과제) 과제 기획 및 공모 신청 Power To Heat의 약자로, 전력 과잉생산 시 잉여전력을 히트펌프 등 열에너지로 전환하여 수요처에 공급

재생에너지 수용성 확대를 위한 EV 충전인프라 구축

□ 추진방향

ㅇ EV 충전인프라 구축 확대를 통한 道 탄소중립 실현과 양질의 대중교통 서비스 제공

ㅇ 설계, 감리, 전기공사 등 지역 기업 참여를 통한 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: ‵26. 1. ~ 9.

ㅇ 총사업비: 30억 원(예정)

ㅇ 사업규모: EV 충전기 20기 구축(확정: 8기, 예정: 12기)

ㅇ 주요내용: 지자체와의 협업을 통한 전기버스 EV 충전인프라 확대

□ 추진상황

ㅇ 전기버스 EV 충전인프라 구축 사업 계획 수립(8기): ‵25. 10.

ㅇ 전기버스 충전기 설치를 위한 공유재산심의 및 도의회 의결: ‵26. 1.

□ 추진계획

ㅇ (신규) EV 충전인프라 사업 규모 협의 및 확정: ~ ‵26. 2.

ㅇ (신규) EV 충전인프라 구축 사업계획 수립: ~ ‵26. 2.

ㅇ (도내기업 참여) 충전기 구매, 전기공사, 감리용역 추진: ‵26. 4. ~

ㅇ 버스회차지 3개소 대상 8기 준공: ~ ‵26. 5.

ㅇ 충전기 구축 준공 및 상업운전개시: ~ ‵26. 9.

DX(디지털전환) 기반 전력중개사업 확대 추진

□ 추진방향

ㅇ 독립형 BESS 운용을 통해 안정적 수익 창출 기반을 마련

ㅇ 발전사업 중심의 단일 수익 구조를 탈피하기 위해 전력중개사업으로 사업영역을 확장하고, 중장기적 매출 구조 다각화를 추진

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: ‵25. 1. ~ ‵27. 12.

ㅇ 주요내용: VPP플랫폼 개발을 통한 전력중개 시장 참여 및 고도화

1단계(완료)_PV	▷	2단계(현재)_WT	▷	3단계
~ 2025.12.		~ 2026.12.		~ 2027.12.
·전력중개사업자 절차 이행 ·고정가격계약 체결된 소규모 자원 적용 ·교래, 수산태양광 활용		·독립형 ESS 자원 참여 추진 ·타 중개사업에 참여 중인 모든 자원을 공사 VPP로 연계 ·동복풍력발전단지 활용		·공사 자원을 통합 관리하고, 외부자원 모집 추진 ·道 자원 연계 협조 추진 ·가시·행원 풍력발전단지 활용

※(참고) ISO-DSO-VPP국책과제를 통한 VPP개발 추진

- 사업기간: 2023. 4.~2026. 12.

- 총사업비: 197억 원(정부출연금:114.5억 원, 민간부담금 82.5억 원)

- 주요내용: ISO-DSO-VPP 플랫폼 개발을 통한 전력시장 참여, VPP플랫폼과 연계된 독립형ESS 설비 구축 및 운영 등

□ 추진상황

ㅇ 공사 사업 영역 확대를 위한 전력중개사업자 지위 획득: ‵25. 5.

ㅇ 공사 최초 전력중개사업자로 전력시장에 참여: ‵25. 9.

ㅇ 공사 최초 독립형ESS 준공에 따른 사업개시 완료: ‵25. 10.

ㅇ 전력중개사업 2단계 세부 계획 수립 완료: ‵25. 12.

□ 추진계획

ㅇ 독립형ESS 급전가능 재생에너지 자원등록을 통한 2026년 상반기 급전이행능력시험 대응 추진: ~ ‵26. 2.

ㅇ 풍력발전단지를 활용하여 전력중개시장 직접 참여를 통해 중장기적 매출 구조 다각화 추진: ~ ‵27. 12.

[국책사업] 제조업 RE100 달성을 위한 P2H 보급사업

□ 추진방향

ㅇ 정부의 히트펌프 보급 활성화 정책 대응 국책과제 유치 및 사업비 확보

- 지역난방 미보급 지역에 적합한 분산형 열공급(태양광+히트펌프) 설비보급형 패키지 모델 구축

- 청정에너지(전력 및 열) 거래 사업의 맞춤형 사업모델 실증

ㅇ 청정에너지 활용에 따른 제조업 분야 RE100 달성 발판 마련

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: ‵26. 4. ~ ‵27. 12.

ㅇ 사업비: 약 10억 원(국비 6억 원, 민간 부담금 등 4억 원)

ㅇ 사업내용: 도내 제조업·서비스업 분야 P2H(Power to Heat) 시스템 적용을 통한 에너지 전환(100% 전전화) 및 효율 향상 추진

ㅇ 사업규모: 태양광 연계 P2H 기반 열 공급 시스템 구축

- 자가용 분산 전원(태양광) 구축

- P2H 기반 열 공급 시스템(히트펌프, 축열조, 열공급 배관 등) 구축

ㅇ 추진방법: 국비지원 연구과제 수주를 통한 국비+도비 지원 방식

□ 추진상황

ㅇ 실증 대상지 검토(열부하 등) 및 사업비 산정 : ~ ‵25. 12.

ㅇ 국비지원 연구과제 검토: ~ ‵25. 12.

- (산업부) 지-산-연 협력 기반 기업 생태계 전환기술 사업 검토: ‵26. 1. ~

□ 추진계획

ㅇ 지-산-연 협력 기반 기업 생태계 전환기술 사업 검토: ~ ‵26. 2.

ㅇ 컨소시엄 구성 및 기관별 R&R 정립: ~ ‵26. 2.

ㅇ 사업계획 수립 및 신청: ~ ‵26. 3.

ㅇ (선정 시) P2H(열공급 시스템) 설계: ~ ‵26. 11.

ㅇ (선정 시) P2H(열공급 시스템) 설비 착공: ‵26. 12. ~

3		청정수소 생태계 구축

	❍ 수소 생산·저장·활용 전주기 기반 조성을 통해 제주형 수소경제 실현과 청정수소 허브 조성 기반 마련 ❍ 청정수소 정책 지원, 연구 실증, 신규 국책과제 유치 등 수소경제 활성화 도모
	추진 목표	·(3.3MW청정수소) 생산원가 절감방안 마련 및 이행 ·(5MW PEM) 인허가 및 기본/상세 설계 착수 PEM(Proton Exchange Membrane) 고분자전해질막 수전해, 재생에너지 변동 대응에 유리한 수전해 기술 ·(12.5MW그린수소) 인허가 완료 및 수전해 설비 착공 ·(RE100 수소단지) 수소 시범단지 준공 및 실증 운전

3.3MW 청정수소 생산시설 운영

□ 추진방향

ㅇ 안전관리 체계 확립을 통한 안전사고 제로화

ㅇ 체계적인 운영관리로 설비 고장률 최소화 및 수소 생산단가 절감

ㅇ 수소경제 활성화를 위한 도내기업 육성

□ 사업개요

ㅇ 총사업비: 약 28억 원(자체 8억 원, 道 출연금 20억 원)

ㅇ 주요설비: 3.3MW 수전해 생산 및 출하시설

※ 알카라인 수전해(1MW×2식), PEM (1MW×1식+0.3MW×1식), ESS시스템(2MW×1식) 등

□ 추진계획

ㅇ 정기·특별 전문교육(월 1회)실시 및 법정 정기검사 적기이행으로안전사고 제로화 (계속)

ㅇ 설비 고장률 최소화 및 수소 생산단가 절감 (계속)

- 제조사 활용 등 설비운영 고도화를 통한 고장 최소화로 유지보수 비용 절감

- 전기요금 절감을 위해 신재생에너지발전원과 PPA 계약 체결

ㅇ 수소경제 활성화를 위한 도내업체 육성: ‵26. 3. ~ 12.

- 도내 고압가스 관련 기업 간담회 등을 통해 수소 산업 참여방안 공유

- 수소 생산시설 및 충전소 운영에 대한 전문가 교육 실시

[국책사업] 5MW급 플랜트형 PEM 수전해 시스템 개발사업

□ 추진방향

ㅇ 출력제어 분석을 통한 그린수소 경제적 단가 분석

ㅇ 인허가 선제 대응 및 플랜트 구축을 위한 설계 지원

ㅇ 과제 종료 후 道 기부채납을 위한 사전협의 및 상세 협약 체결

ㅇ 마을 수용성 확보를 위한 소통 및 협력 강화

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: ‵25. 7. ~ ‵29. 6.

ㅇ 총사업비: 약 420억 원(국비 209억 원, 도비 25억 원, 민간 186억 원)

ㅇ 참여기관: 현대엔지니어링(주관), 제주에너지공사 외 13개 기관

ㅇ 주요내용

- 수전해 시스템 전력소모량 52kWh/kg 달성 및 시스템 국산화

- 5MW PEM 수전해 실증을 통한 그린수소 1.5톤/일 생산 및 안정적 공급

□ 추진상황

ㅇ 과제 공고(‵25. 6.) → 공모 신청(‵25. 7.) → 발표평가(‵25. 7.) → 과제 선정(‵25. 8.)

ㅇ 에기평-컨소시엄 간 협약 체결(‵25. 9.) → 착수 회의(‵25. 10.)

ㅇ (공사) 그린수소 활성화를 위한 직접PPA 제도 개선 건의(수소학회, 수소연합): ‵25. 12.

ㅇ (컨소시엄) 인허가 및 기본/상세 설계 착수: ‵26. 1.

□ 추진계획

ㅇ (컨소시엄) 수전해 시스템 기본/상세 설계 완료: ‵27. 3.

ㅇ (컨소시엄) 인허가 절차 완료 및 착공: ‵27. 7.

ㅇ (컨소시엄) 수전해 시스템 현장 설치 및 시운전 완료: ‵28. 9.

ㅇ (컨소시엄) 사업개시 신고 및 수소생산: ‵28. 12. ~

[국책사업] 12.5MW 재생에너지 연계 대규모 그린수소 개발

□ 추진방향

ㅇ 부지조사, 인허가 등 역무 동시 추진을 통한 기간 단축

ㅇ 개발행위허가에 따른 관련부서 협의 및 주민의견 청취

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: ‵22. 4. ~ ‵26. 9.(‵27. 9월까지로 기간 연장 절차 진행 중)

ㅇ 총사업비: 약 570억 원(국비 268억 원, 민간 302억 원)

ㅇ 참여기관: 한국남부발전(주관) 외 11개 기관

ㅇ 주요내용

- 국내 최대 10.9MW급, 국내외 타입별(4type) 수전해 설비 설치와 운영

- 新전력시장 요금제도(PPA, 플러스DR 등) 활용한 그린수소 생산 및 상용화를 위한 경제성 확보 방안 마련

Power Purchase Agreement의 약자로, 발전사업자가 생산한 전력을 한전을 통하지 않고 직접 거래하는  전력 판매 방식

잉여전력이 발생할 것으로 예상되는 시간에 전력을 사용하여 잉여전력문제를 해소하는 수요반응 제도

□ 추진상황

ㅇ (컨소시엄) 특별평가 및 협약변경 완료(12.5MW→10.9MW): ~ ‵24. 7.

ㅇ (컨소시엄) 사업 실증부지 변경(북촌리 56-3 → 북촌리 산 36): ‵25. 6. ~ 8.

ㅇ (컨소시엄) 참여기관 변경에 따른 특별평가 및 협약변경 : ‵25. 9. ~ 11.

ㅇ (컨소시엄) 실증지 입목본수 조사 완료: ‵25. 12.

ㅇ (공사) 사전 산림조사 용역 완료: ‵25. 12.

□ 추진계획

ㅇ (공사) 소규모 재해·환경영향평가 완료: ~ ‵26. 6.

ㅇ (컨소시엄) 실증지 개발행위허가 등 인허가 완료: ~ ‵26. 6.

ㅇ (컨소시엄) 인허가 완료에 따른 수전해 설비 착공: ‵26. 9. ~

[국책사업] RE100 기반 수소 시범단지 인프라 기술 개발

□ 추진방향

ㅇ 국내 최초 RE100 수소 산업단지 조성으로 2035 탄소중립 정책 실현 선도

ㅇ 인프라 구축 공사의 체계적 공정 관리를 통해 적기 조성 및 안정적 추진

ㅇ 도내 수소 생산·저장 인프라 확충을 통한 수소 모빌리티 공급 안정화 도모

□ 사업개요

ㅇ 사업명: RE100 기반의 수소 시범단지 인프라 기술 개발

ㅇ 사업기간: ‵22. 4. ~ ‵26. 12.

ㅇ 총사업비: 약 367억 원(국비 269억 원, 도비 40억 원, 민간 58억 원)

ㅇ 참여기관: 한국에너지기술연구원(주관) 외 11개 기관

ㅇ 주요내용

행원연안4.2MW풍력 → 1MW수전해 → 수소저장 → 0.7MW연료전지 → 용암해수 산업단지

↳ - - - - - - → 8MWhBESS → - - - - - - - - ⤴

- (기술개발) 단주기(전력) 및 장주기(수소) 에너지 저장과 ICT 기술을 활용하여 재생에너지의 간헐성을 극복하여 산업단지 RE100 실현

- (주요설비) 1MW 수전해, 800kg 수소 저장설비, 3MW/8MWh BESS,
0.7MW 연료전지, 수소 출하설비, 통합운전제어시스템 등

- (道, 공사 역할) 부지제공, 인허가, 인프라 구축 공사, 실증 후 운영

□ 추진상황

ㅇ (국토부, 에기연) 실증 대상지 지원 지자체 모집 공모(‵24. 7.) 및 선정(‵24. 8.)

ㅇ (道, 공사, 에기연) 실무 협상 회의(16회) 운영: ‵24. 9. ~

※ 사업참여 방안, 기부채납 및 운영 방안, 인허가/설계/시공 역할 세분화 등

ㅇ (道, 국토교통과학기술진흥원, 에기연) 업무협약 체결: ‵24. 10.

ㅇ (道, 공사) 도시관리계획 결정 제안서 제출 및 입안 신청: ~ ‵25. 12.

□ 추진계획

ㅇ (컨소시엄) 인허가 확보 및 공사 착공: ~ ‵26. 6.

ㅇ (컨소시엄) 수소 시범단지 준공 및 실증 운전: ‵26. 12. ~

Ⅴ. 2025년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅴ. 2025년 행정사무감사 지적사항 처리결과

1		현황

(2026년 1월말 현재)

소관별	추 진 상 황				비고
	계	완 결	추진중	추진불가
제주에너지공사	4	3	1		25년
	4	3	1		24년

2		목록

(2026년 1월말 현재)

연번	시정 및 처리 요구사항	추진상황
25-1	제주에너지공사 수익구조 개선 및 노후 풍력발전단지 리피워링을 통한 경제성 확보 필요	완결
25-2	소규모 풍력사업 참여 희망 마을에 대한 정확한 사업 추진 절차 안내 필요	완결
25-3	분산에너지 특화지역 지정 확대 및 지정 이후 관리 준비 철저	완결
25-4	서부 해상풍력(가칭) 신속한 사업 추진 필요	추진중
24-4	3.3MW 그린수소 실증사업의 공사 역할 강조	추진중

3		행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항
25-1. 제주에너지공사 수익구조 개선 및 노후 풍력발전단지 리피워링을 통한 경제성 확보 필요
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 지속가능한 공사 경영 및 실행력 확보를 위한 경영목표, 제도개선 과제 수립 → 공사 중장기 전략과제 및 사업추진 방향 설정 □ 공사 사업다각화를 통한 25년도 신규 매출 확보내역 - (매출) 청정수소 판매수익 15억 원, EVC 운영수익 약 13억 원 - (영업외) 조세 경정청구 3억 원, 변전소 시설사용료 2억 원 등 □ 풍력발전단지 리파워링 현황 - 제주에너지공사 신규사업 확대를 위한 개발 가이드 수립: ‵25. 3. - 내부 리파워링 워킹그룹 구성 및 회의, 관계기관 협의: ‵25. 3. - 행원풍력 리파워링 기본 계획(변경) 수립: ‵25. 4. ⇨ 한국남부발전과 공동개발을 통한 리파워링 우선 추진 - 한국남부발전 공동개발 의견 회신 요청: ‵25. 5. - 한국남부발전 공동개발 협의: ‵25. 10., ‵25. 12. · 기자재 활용 방안, 그린수소 연계 방안 등 검토 □ 향후계획 □ 신규 실증사업 추진 시 계획수립 단계에서 공사 사업과의 연계방안을 마련하는 등 면밀한 검토를 통해 추진 예정 □ 매출안정화, 신규 수익발굴, 비용절감을 통한 경영혁신으로 경영 수지 개선 추진 예정 □ 행원풍력 리파워링(2.3MW) 사업 추진방식 결정 - 사업 추진방식 결정에 따른 전기사업허가 변경 등 인허가 추진
담당부서	제주에너지공사 ESG기획부 (☎ 720-7421) 청정에너지개발부 (☎ 720-7461)

시정 및 처리요구사항

25-2. 소규모 풍력사업 참여 희망 마을에 대한 정확한 사업 추진 절차 안내 필요

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (   ),  추진불가 (   )

□ 소규모 풍력 참여 희망 마을 현황               * 부지제공마을

사 업 명	수망마을풍력발전사업	동백마을풍력발전사업
참여마을	수망리*, 신흥1리, 위미3리, 하례2리	신흥2리*, 태흥1리, 태흥3리
설비용량	12.4㎿(6.2㎿×2기)	12.4㎿(6.2㎿×2기)
참여기업	㈜수망마을풍력발전소/제이원윈드파워㈜	제이원윈드파워㈜
추진상황	풍력개발후보 지위 부여(‘25.11.)	사업추진 협약체결(‘24.3.26.)
사 업 명	한남마을풍력발전사업	의귀리마을풍력발전사업
참여마을	한남리*, 남원1리, 남원2리	의귀리*, (신흥2리, 한남리)
설비용량	12.4㎿(6.2㎿×2기)	12.6㎿(4.2㎿×3기)
참여기업	제이원윈드파워㈜	제이원윈드파워㈜
추진상황	사업추진 협약체결(‘24.5.9.)	사업추진 협약체결(‘24.8.5.)
사 업 명	애월읍마을풍력발전사업	송당․덕천마을풍력발전사업
참여마을	광령1·2*·3리, 고성1·2리, 유수암리, 상귀리	송당리, 상도리, 하도리, 덕천리, 한동리, 종당리
설비용량	12.4㎿(6.2㎿×2기)	24.8㎿
참여기업	제이원윈드파워㈜	제이원윈드파워㈜
추진상황	사업추진 협약체결(‘24.8.29.)	사업추진 협약체결(‘24.9.2.)
사 업 명	영일동마을풍력발전사업
참여마을	영락리, 일과2리, 동일2리
설비용량	9.9㎿(3.3㎿×3기)
참여기업	영일동풍력발전㈜/웅진엔지니어링㈜
추진상황	공공성 사전검토 완료(‘24.12.26.)

□ 추진상황

□ 소규모 마을풍력 관련 설명자료 마련: ~ ‵25. 10.

□ 영일동 소규모풍력 추진현황 점검 및 소통 실시: ‵25. 11.

- 사업추진 현황 점검 및 사업 이해도 제고, 갈등 사전 예방을 위한 안내

□ 애월읍 소규모 풍력 현황 파악 및 마을 설명 실시: ‵25. 11.

- 소규모 풍력사업 추진 절차 및 사업 추진시 고려 사항 당부

□ 남원읍 내 소규모 풍력 추진 및 전력계통 관련 마을 의견청취: ‵25. 12.

담당부서

제주에너지공사 관리기관운영부 (☎ 720-7451)

시정 및 처리요구사항
25-3. 분산에너지 특화지역 지정 확대 및 지정 이후 관리 준비 철저
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 분산에너지특화지역 지정 관련 - 제주형 분산에너지특화지역 계획 수립 및 지정 신청: ‵24. 4. - 제주 분산에너지지원센터 설립: ‵25. 2. - 제주 분산에너지특화지역 최종 선정(VPP 연계 ESS, V2G, P2X): ‵25. 11. - 분산에너지 특화지역 지정 고시(제주 VPP 기반 V2G, ESS, P2X 사업): ‵25. 12. □ 분산에너지 관련 현재 공사 추진 사업 - P2H(Power to Heat) 실증사업 추진(대상: 농업, 축산, 관광시설) - 태양광 연계 히트펌프 기반의 분산형 열공급 시스템 보급 추진 - VPP 플랫폼을 활용한 공사 최초 전력중개사업 추진: ‵25. 9. - 독립형 ESS 구축(규모: PCS 기준 1MW): ‵25. 10. - 제주 장주기 중앙계약시장 BESS 구축(규모: PCS 36.18MW, BAT 205.117MWh): ‵26. 1. □ 향후계획 □ 분산에너지특화지역 및 분산에너지지원센터의 효율적인 운영을 위해 공사는 세부사업 발굴, 실행 및 운영 관리를 중심적으로 수행 - 道-공사 간 역할 정립을 위해 지속적 협의 추진 □ 분산에너지특화지역 지정에 따른 신규사업 검토 및 발굴 추진 - 국책과제로 개발한 VPP 플랫폼을 고도화하여 변화하는 전력시장 대응을 위해 전력수요-공급 매칭 사업(VPP 기반 V2G, ESS, P2X)
담당부서	제주에너지공사 분산에너지사업부 (☎ 720-7471)

시정 및 처리요구사항
25-4. 서부 해상풍력(가칭) 신속한 사업 추진 필요
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 사업개요 □ 사업명: 서부 해상풍력발전단지 조성사업(가칭) □ 사업예정위치: 제주시 한경면 인근 해역 □ 추정 설비용량: 약 181MW급 ※ 사업규모는 사업희망자가 제안 □ 추정 총사업비: 약 12,241억 원 □ 사업기간: (개발) ‵25년 ~ ‵32년 / (건설) ‵33년 ~ ‵35년 □ 추진경과 □ 공공주도2.0 풍력자원개발사업 의견청취 공고: ‵24. 5. ~ 6. □ 사업참여의향서 제출마을 소통상담소 운영: ‵24. 7. ~ 8. □ 사업우선순위(1차) 2개소(1구역 추자, 2구역 서부) 선정: ‵24. 10. □ 서부지역 주민설명회 개최 및 결과 道 제출: ‵24. 12. □ 서부지역 주민수용성 확보(마을․어촌계 총회 100% 찬성)완료: ‵25. 2. □ 공공주도2.0 1차 사업개발계획(안) 道 승인: ‵25. 7. □ 서부지역 인접마을 사업참여 검토 및 지역갈등 예방 실시: ~‵25. 12. □ 서부 해상풍력(가칭) 공모 계획 수립 및 공모지침서(안) 마련: ‵26. 1. □ 향후계획 □ 서부 해상풍력(가칭) 사업희망자 공모 실시: ‵26. 2. □ 서부 해상풍력(가칭) 공모 평가 및 우선협상대상자 선정: ~ ‵26. 9.
담당부서	제주에너지공사 관리기관운영부 (☎ 720-7451)

시정 및 처리요구사항
24-4. 3.3MW 그린수소 실증사업의 공사 역할 강조
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ◯ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 3.3㎿ 그린수소 생산 및 저장 국책과제 종료 후 공사 주체 상업 운전 시행: ‵24. 10. ~ 현재 □ 수행 가능 범위 내 설비 유지관리 및 보수, 압축기 증설공사, 튜브트레일러 운송 등 도내기업 적극 활용 □ 제주 수소경제 활성화 및 지속 성장 기반 마련을 위한 다양한 협의체 구성 및 운영: ‵25. 11. ~ 현재 - 청정수소 보급 활성화 협의체 - 청정수소 생산시설 고도화 협의체 - 청정수소 사업 벨류체인 일원화 협의체 □ 향후계획 □ 도내 수소차량 운행자 만족도 증진 및 불편 최소화를 위해 공급 가격 적정성 관리 및 안정적 공급체계 마련 □ 도내 고압가스 관련 기업 간담회 등을 통해 수소 산업 참여방안 공유 □ 수소 생산시설 및 충전소 운영에 대한 전문가 교육 실시
담당부서	제주에너지공사 청정수소사업부 (☎ 070-4924-2011)