제436회 제주특별자치도의회 임시회

문화관광체육위원회

서귀포시-대보건설(주) 업무협약 체결 보고

2025. 2.

	서귀포시 (체육진흥과)

서귀포시-대보건설(주) 업무협약 체결 보고

ㅇ 서귀포시 종합체육관 건립사업 관련 계약상대자인 ㈜대보건설과 지역건설산업 활성화를 위한 업무협약(MOU) 체결에 따른 보고

□ 협약목적

ㅇ 서귀포시와 ㈜대보건설 시공사 간 업무협약을 통해 서귀포시 종합체육관 건립사업에 지역업체가 참여하여 지역건설산업을 활성화시키기 위함

□ 체결개요

ㅇ (협 약 명) 지역건설산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)

ㅇ (체결시기) 2025. 2. 13.(목)

ㅇ (협약대상) 서귀포시↔대보건설(주)

ㅇ (협약기간) 2025. 2. 13. ~ 2027. 2. 12.

□ 주요 협약내용(별첨 1)

ㅇ 서귀포시 종합체육관 건립사업에 대해 도내 소재업체(시공, 건설자재, 인력, 장비 등 포함) 하도급 비율을 70% 이상 참여할 수 있도록 협조한다.

ㅇ 상호신뢰를 통해 공사현장에서의 공정별 업체 선정 계획등의 정보를 공유하고, 지역업체 참여를 위한 기회 제공에 적극 협조한다.

ㅇ 사업추진 과정에서 현안사항 발생 시 상호간 적극 협력·지원 한다.

□ 향후계획

ㅇ‘25. 2월: 실시설계 및 우선시공분(Fast-Track) 공사 완료

ㅇ'25. 2월: 건축 인허가 접수 및 실시설계도서 설계의 경제성(VE) 검토

ㅇ'25. 3월: 실시설계도서(본공사) 납품 및 건설기술심의(도 건설과)

ㅇ25. 4월 중: 가격협상 및 본공사 계약/착공(착수일로부터 19.5개월)

ㅇ'25. 4월 ~ '26. 12월 : 본공사 진행(전국체전 일정 고려해 '26. 10월까지 준공)

[별첨1]

지역건설산업 활성화를 위한

「서귀포시-대보건설(주)」업무협약서