2008. 11

2008년도 행정사무감사

환 경 도 시 위 원 회

주 요 업 무 보 고

상하수도본부

보 고 순 서

1. 주요업무 보고

주  요   추  진  성  과

비    전     과     목    표

주 요 업 무  추 진 상 황

2007 결산 및 2008 예산집행현황

소   관    입   법   현   황

2007 행정사무감사시 지적사항 시정조치결과

제248회 임시회 도정질문 답변에 따른 추진상황

2. 2008 행정사무감사 자료

주요 추진성과

❏ 통합 상수도의 경영합리화 추진

□ ´07년 결산결과 손실액이 통합 1년차 131억, 통합 2년차 55억으로, 76억이 줄어들어 통합에 따른 가시적 경영성과 창출

※ 비용절감 : 41억(시설정비 12, 무인화 3, 수선비 26), ※ 수익증가 : 35억(수질개선교부금 14, 부담금등 21)

☞ 유휴시설 정비 65개소(지하수 64, 용천수 1) : 45억원

☞ 수도시설의 현대화를 통한 인건비 절감(취수장 5, 가압장 3 무인화) : 10억원

❏ 도 전역의 안정적 용수공급 시스템 구축

❍ 광역상수도(Ⅱ단계)사업 준공으로 광역급수체계 구축 마무리

❍ 어승생 제2저수지 및 우도해저상수도 신규사업 추진으로 중산간 및 우도지역의 근원적 물문제 해결 계기 마련

❏ 선진국 수준의 상수도 생산․관리시스템 구축 등 우리도 수돗물 우수성 홍보 기틀 마련

❍ 광역상수도(Ⅰ단계)정수장 전국최초의 지하수인증 취득(여과시설비 280억 절감)

❍ 국제표준에 의한 환경경영체계(ISO14001) 인증 취득

❏ 상․하수도 조직 통합에 따른 시너지 효과 창출 계기 마련

❍ 정부의 상․하수도 통합 추진방향에 맞추어 전국 최초 통합

❍ 물관리정책 수립의 일원화와 회계통합 운영 등 규모의 경제를 통한 예산절감 및 효율적 업무추진

❏ 우리도 청정 환경 보전과 지하수 오염방지를 위한 하수관거의 대대적 확충

❍ BTL사업(‘06) : 하수관거 292㎞ 정비․1,817억원 투자(’08년 275억 투자)

❍ 재정사업(’08) : 하수관거 80㎞ 정비․395억원 투자

☞ 건설경기 등 지역경제 활성화에 기여

VISION과  목표

세계가 인정하는 제주형 물관리 체계 혁신

제주의 물, 세계의 물, 제주의 브랜드

세계가 인정하는 제주형 물관리 시스템 구축

환경친화적 물관리 인프라 구축으로 청정제주 브랜드화

	전략목표
경영합리화를 통한 수돗물 생산․공급의 고품질화 세계자연유산 도시에 걸맞는 상하수도시설 확충 쾌적하고 안정된 물관리 행정서비스로 고객감동 구현 미래 물부족에 대비한 능동적 수자원 관리

주요 중점 추진 과제

통합 상․하수도 운영의 가시적 성과 창출

글로벌 수준의 상수도 생산 공급 체계 확립

믿음을 주는 수도행정으로 도민 신뢰도 제고

도서지역의 근원적인 물 문제 해결

미래 지향적 광역하수도 정책 수립

청정 환경 조성을 위한 하수관거 조기 확충

선 진  하 수 처 리 시 스 템  구 축

지역주민과 함께하는 하수처리장 효율적 운영

지하수관정의 효율적 관리체계 구축

대체수자원 이용기반 확대를 위한 농촌용수개발사업 추진

수자원의 다원화를 위한 빗물이용시설 활성화

도 전역의 안정적 용수공급체계 구축

••••  주요업무 추진상황 ••••

❚  목     차  ❚

통합 상․하수도 운영의 가시적 성과 창출

글로벌 수준의 상수도 생산 공급 체계 확립

믿음을 주는 수도행정으로 수돗물 신뢰도 제고

도서지역의 근원적인 물 문제 해결

미래 지향적 광역하수도 정책 수립

청정 환경 조성을 위한 하수관거 조기 확충

선 진  하 수 처 리 시 스 템  구 축

지역주민과 함께하는 하수처리장 효율적 운영

지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

대체수자원 이용기반 확대를 위한 농촌용수개발사업 추진

수자원의 다원화를 위한 빗물이용시설 활성화

도 전역의 안정적 용수공급체계 구축

통합 상․하수도 운영의 가시적 성과 창출

〈1〉상   수   도

❍ 상․하수도 통합에 따른 규모의 경제 실현으로 생산원가 절감

❍ 효율적이고 새로운 시스템 운영을 통한 생산성 향상

ꏚ 추진개요

□ 수도사업의 자구노력(원가절감)을 통한 경영합리화 기반 구축

□ 연차적 유휴시설 정비, 무인화시스템, 태양광 발전으로 생산성 제고

ꏚ 추진 실적

□ 수도사업의 자구노력(원가절감)을 통한 경영합리화 기반 구축

∙´07년 결산결과 손실액이 통합 1년차 131억, 통합 2년차 55억으로, 76억이 경영수지 개선 등 통합에 따른 가시적 경영성과 창출

☞ 광역용수공급체계 전환에 따른 유휴시설정비로 원가절감 : 4,529백만원

※ ´07까지 : 지하수 37개소  광역  상수도  대체(1,220백만원)

※ ´08추진 : 용천수  1개소, 지하수 27개소 정비(3,309백만원)

☞ 무인화 시스템 구축 등 시설 현대화를 통한 인건비 절감 :   960백만원

※ ´07까지 : 가압장 2개소 무인화               -  6명 타 사업장 재배치(240백만원)

※ ´08추진 : 취수장 5개소, 가압장 1개소 무인화 - 18명 타 사업장 재배치(720백만원)

∙상수도 유휴시설 농업용으로 전환 활용(22개소)

☞ 광역상수도 공급체계 전환에 따라 지하수 개발비용 22억 절감

∙조천정수장 태양광 발전 시스템 구축으로 동력비 절감

☞ 연간 전력료 절감 효과 : 10백만원(136,800KWh, 조천정수장 동력비 10%)

ꏚ 향후 추진계획

❍ 광역상수도 공급체계 전환에 따른 지속적 유휴시설 정비(지하수 10개소)

❍ 취수장 및 가압장 무인화시스템 구축 지속 추진

❍ 고유가 극복을 위한 에너지 절약 방안마련 추진

☞ 정수장 가동, 일부 심야시간대로 조정 동력비 절감

☞ 친환경에너지(태양광)시스템 단계적 구축으로 동력비 절감

〈2〉하   수   도

ꏚ 추진개요

❍ 상하수도 조직 통합으로 효율적인 관리체계 및 운영제도개선

□ 처리장, 소규모 처리시설 등 통합 운영으로 경비절감

□ 농공단지 폐수 ․분뇨등 연계처리방안 강구로 운영효율 극대화

☞ 농공단지 3개소(금릉, 구좌, 대정),분뇨 2개소(금악, 선흘), 축산분뇨(금악)

□ 하수관거사업(재정 및 BTL) 추진 등 시설확충을 통한 가동률 향상

❍ 하수도통합에 걸맞는 회계 일원화및 요금 현실화 단계적 추진

□ 3원화된 회계를 하수도 공기업 회계로 개편

□ 요금체계의 일원화 및 중장기 현실화율 제고

❍ 상․하수도 업무 및 공사 병행추진으로 시너지 효과 극대화

□ 병행 공사 추진으로 이중굴착 방지 및 사업비 절감

□ 전문인력 및 장비 통합운영으로 인건비와 유지비 절감

□ 상하수도 근무인력의 순환 보직으로 전문성 확보

ꏚ 추진실적

❍ 전국 최초의 상하수도 조직통합으로 시너지 효과 창출계기 마련

❍ 광역도시계획과 연계한 통합 하수도정비 기본계획 수립(시행중)

□ 통합하수도의 장기 비전과 정책방향 제시

❍ 투자유치 인센티브 제공을 위하여 투자진흥지구내 하수도원인자부담금 감면규정 신설(50% 감면)

❍ 집중호우대비 하수도준설 및 시설물 합동점검 등 상호 업무보완

ꏚ 향후 추진계획

❍ 효율적인 장기 하수도 비전 제시로 경영합리화 추진(기본계획 수립 : ‘09.2)

❍ 환경기초시설(농공단지, 위생분뇨 등)의 단계적 연계처리 추진

❍ 하수도 회계 통합을 위한 자산평가 및 단계적 요금 현실화 추진

ꊲ  글로벌 수준의 상수도 생산 공급체계 확립

❍ 국제표준에 의한 체계적이고 표준화된 물관리시스템 운영

❍ 지하수 인증, 수질기준 강화, 소독시스템 개선 등으로

고품질 수돗물 생산․공급

ꏚ 추진개요

❍ 선진국 수준의 환경경영체계(ISO14001) 적용 상수도 생산․관리

❍ 광역상수도(Ⅱ단계) 정수장「지하수 인증」추진

∙5개정수장(토평, 유수암, 금악, 서광, 회수)에 대한 인증절차 이행

❍ 세계적 수준의 먹는 물 수질관리로 글로벌 수준의 수돗물 생산공급

∙WHO 권장수준 수질검사 항목 확대 : 60항목(‘08)→66항목(’09)→96항목(‘12)

❍ 소독방식 개선을 통한 고품질 수돗물의 생산․공급

∙고체약품(차아염소산칼슘) ⇒ 액체약품(차아염소산나트륨) 으로 교체

ꏚ 추진실적

❍ 선진국 수준의 상수도 환경경영체계(ISO14001) 구축 : ‘07. 12. 21

❍ 광역상수도Ⅰ단계(4개 정수장) 전국 최초 지하수 인증획득 : ‘07. 6. 25

☞ 우리도 수돗물의 우수성 홍보 및 정수처리시설비 280억원 절감

❍ 먹는물 수질검사 항목 60개 항목(기존 55개 항목)으로 확대 : ‘08. 9월부터

❍ 소독방식 개선 고품질 수돗물의 생산․공급 : ‘08. 4월부터

∙액체 염소소독 약품투입기 교체 : 50개소 교체 완료

❍ 수도정비기본계획수립 용역 완료 : ‘08. 5. 2

ꏚ 향후 추진계획

❍ 선진국 수준의 환경경영체계(ISO14001) 업그레이드

∙상수도 정기 경영심사 및 하수도분야 ISO14001 추가인증 : ‘08. 12

❍ 광역상수도Ⅱ단계 5개 정수장「지하수 인증」완료 : ‘09. 6

❍ 소독방식 개선을 통한 약품 투입기 사용수명 연장으로 유지관리비 절감(연65백만원)

∙액체 염소소독 약품투입기 교체(18개소) : ‘08. 12

ꊳ  믿음을 주는 수도행정으로 수돗물 신뢰도 제고

❍ 전국 최초 지하수 인증 취득으로 우리도 수돗물의 우수성에도 불구하고 음용률이 계속 감소 추세

- 음용률 : 35%(‘04) → 32.2%(’05) → 31.4%(‘07) → 29.4%(’08)

❍ 믿음을 주는 수돗물 고품질 관리로 도민 음용률 향상 제고

ꏚ 추진개요

❍ 수돗물에 대한 도민 만족도 조사 실시 : 공인여론조사기관 매년 조사

❍ 도민과 친근한 정수장 운영

∙탐방객이 많은 정수장 내 수돗물 홍보관 설치 운영 : 2개소․100백만원

❍ 초․중․고교 수돗물 및 마을상수도 수질관리 강화

❍ 수돗물 품질정보 공개 등 홍보강화

ꏚ 추진실적

❍ 수돗물 도민 만족도 조사결과 음용률 향상 시책 발굴 추진

❍ 정수장 물 홍보관 설치 중(2개소) : ‘08. 10. 14 ~ ’08. 12. 13

❍ 초․중․고교 수돗물 및 마을상수도 수질관리 강화

∙학교 수돗물(185개교) : 10항목 분기 1회(하절기 매월 실시)

∙마을상수도(89개소) : 14항목 연4회 → 14항목 2회, 60항목 2회

❍ 정수장 개방으로 수돗물 생산과정 완전 공개 등 물홍보 강화

∙정수장 개방 및 물환경교육 실시 : 개방 33회․1,420명, 교육 16회․1,714명

∙수돗물평가위원회 수질검사결과 공표(연 2회), 타시도 검사의뢰(연2회)

∙도심지 건물옥상 전광판(LED) 광고

∙수돗물품질보고서 가정 배포, 물사랑백일장 개최, 언론기고 등

ꏚ 향후 추진계획

❍ 수돗물 도민 만족도 조사 실시 : ‘09. 2 ~ 3

❍ 자연 친화적 배수지 외부모델링 시범 추진(2개소)

❍ 공공용 수도꼭지 수돗물 인증제 도입(관광지, 공원 등 195개소)

❍ 수돗물 음용률 향상을 위한 시책 발굴(CI개발, 정수장 개방형 축구장 시범시설 등)

ꊴ 도서지역의 근원적인 물 문제 해결

❍ 도서지역 생활수준 향상 및 매년 증가하는 관광객 편익

증진을 위한 급수환경의 체계적이고 획기적인 개선

❍ 해저상수도․담수화시설․고도정수처리시설 등 도서지역별 특성을 고려한 상수도시설 현대화로 안정적인 급수기반 구축

ꏚ 추진개요

❍ 추자도 : 유효저수량 추가 증대 및 수질개선을 위한 정수처리시설 확충

∙원수다원화로 저수량 증대 <연간 190천톤 ⇒ 376천톤>

- 지하수 54천톤, 묵리 복류수 72천톤, 제4저수지 도수로 정비 50천톤,  예초리 복류수 증설 10천톤

∙담수화시설 확충 : 1,000톤 ⇒ 2,000톤(25억원, ‘10년~’11년)

∙제3저수지 정수처리시설 : 2,000톤(35억원, ‘11년~’12년)

❍ 우도 : 관광객 증가에 대비한 해저상수도시설 확충

∙담수화시설 노후, 유지관리비 과다 및 고장시 대체 공급시설 전무

∙급격한 관광객 증가로 2010년에는 물 부족 문제 발생

- 급수인구 : 주민 1,726명(연간 관광객 ‘07년 520천명 → ’11년 700천명)

☞ 2010년 1일 500톤, 2015년 1,000톤의 부족 발생

∙해저상수도  : 관로13.3km (육상 10.2, 해상 3.1), 배수지 2,050톤, 100억 (‘08년 ~ ’10년)

❍ 마라도 : 관광객 증가에 대비한 담수화시설 증량

∙담수화 시설 및 배수지 증설 : 7억원(국비 4.9, 지방비 2.1) - ‘09년

- 담수화시설 증설 : 25톤/일(50톤 → 75톤), 배수지 증설 50톤/1지

※ 비양도, 가파도는 향후 6~7년 물 부족 문제 없음

ꏚ 추진실적

❍ 묵리 복류수 시설 및 예초리 복류수 증설공사 추진(‘07~’08, 17억원)

❍ 우도 해저상수도 시설사업 (2,000백만원)

∙기본 및 실시설계 용역 추진 : ‘08. 4 ~ 11

❍ 가파도 배수지 개량 사업 추진 (200톤, 10백만원) : ‘08. 7

ꏚ 향후 추진계획

❍ 추자담수화시설 확충 및 고도정수처리시설 설치 : ‘10년~’12년

❍ 우도 해저상수도시설 관로공사 발주 : ’08. 12

❍ 마라도 담수화시설 및 배수지 증설 실시설계 : ‘09. 3

미래지향적 광역하수도 정책 수립

❍ 광역도시기본계획과 연계한 미래 지향적 광역하수도 기본계획 수립

❍ 종전 시․군의 기본계획을 광역계획으로 통합하여 선진 하수처리 체계 구축 및 하수도시설물의 효율적인 운영관리 도모

ꏚ 정책방향

❍ 광역도시기본계획과 연계한 2025년까지의 장기 하수도비전 제시

❍ 하수도 통합에 걸맞는 하수처리구역의 합리적 재조정

❍ 대규모 개발사업 등 하수발생량 증가에 대비한 하수처리장 증설

❍ 환경기초시설의 연계처리로 하수처리장 운영효율 극대화

ꏚ 추진실적

❍ 광역하수도정비 기본계획수립 추진

□ 장기 하수도 수요 예측에 따른 처리구역조정 및 증설계획 마련

- 시설용량 : 197천톤 ⇒ 243천톤(증 46천톤)

- 신설계획을 인근처리장 증설로 전환하여 민원예방 및 사업비 절감

□ 환경기초시설 및 간이마을하수도 연계처리로 운영의 효율성 증대

- 환경기초시설 6개소,     - 마을하수도 39개소

❍ 하수도사용조례 제정

□ 분뇨 처리수수료는 공공요금 억제 방침에 따라 최저 요금으로 통합

※ 정화조 폐쇄에 따른 사업물량 감소로 분뇨수집 운반업체 불만 표출

⇒ 수집운반업체 지원방안 마련 및 처리수수료 현실화 필요

□ 하수도사용료 부과(11월분부터) : 제주시 5개 읍․면지역,

서귀포시 남원, 표선지역 신규 부과

❍ 하수도사업 투자규모 확대로 지하수 오염방지 및 청정제주 보호

□ ‘08년 559억원 ⇒ ’09년 637억원(14% 증가)

ꏚ 향후 추진계획

❍ ‘08. 12 : 통합하수도 기본계획(안) 확정

❍ ‘09. 1 : 통합하수도 기본계획 승인신청(환경부)

청정 환경 조성을 위한 하수관거 조기 확충

❍ 우리도의 지질특성상 지하수가 생명수로서 상수원보호를

위하여 하수관거 정비가 매우 시급

❍ 재정 및 임대형 민자사업(BTL)을 활용한 하수관거 조기 확충

ꏚ 추진목표 : 하수관거 시설율 (‘07년말) 73.8% → (’16) 100%

ꏚ 추진방침

❍ 동지역은 재정사업으로 추진, 상대적으로 관거 시설율이 낮은 읍면지역은 재정사업과 BTL사업 병행 추진

ꏚ 사업개요

❍ 하수관거 정비사업(재정 + BTL)

∙사업기간 : ‘94 ~ 2016년도

∙사 업 량 : 4,674km (재정 4,059km, BTL 615km)

∙사 업 비 : 1조8,088억원(재정 : 14,228, BTL : 3,860)

ꏚ 추진상황

❍ 재정사업 : L=3,009km, 사업비 6,964억원 (‘08년추진 80km․395억원)

❍ BTL사업

∙‘06사업(293km, 1,817억원) : ’08년 추진 48km, 275억원(연내 완료)

∙‘08사업(261km, 1,562억원) : 기본계획용역 추진, 12월중 시설사업기본계획(RFP) 고시

∙‘09사업(60.7km, 481억원) : 대상지역 및 한도액 결정

☞ 제255회 도의회 제2차정례회 의무부담 상정□의결 예정

ꏚ 향후 추진계획

❍ 하수관거 재정사업 추진 : 75km․390억원

❍ 하수관거 BTL사업 추진

- ’06BTL : 공사 지속 추진(136km․826억원)

- ‘08BTL : 사업자 선정 및 평가, 협상, 착수

- ‘09BTL : 기본계획 용역 및 행정절차 이행

선진 하수처리시스템 구축

❍ 방류수 수질기준 강화에 따른 법적수질기준 준수로 수질오염방지

※ BOD(㎎/l) 20⇒10, SS(㎎/l) 20⇒10, T-N(㎎/l) 60⇒20, T-P(㎎/l) 8⇒2

❍ 하수슬러지 해양 투기금지에 따른 하수슬러지 처리시설 설치

❍ 방류수 재이용 물 자원 절약 및 장래 물 부족 사태에 능동적 대처

❍ 수질오염물질 실시간 자동 확인을 위한 수질원격감시 체계 구축

ꏚ 추진개요

❍ 제주하수처리장 고도처리시설 사업(‘06.11~’09.5)

□ 고도처리시설 및 노후시설 개량 : 총 43,341백만원

❍ 제주 하수처리장내 하수슬러지 자원화 시설사업(‘05.3~’10.6)

□ 시설규모: 70톤/일, 11,700백만원(2012년이후 하수슬러지 해양배출 금지 예정)

❍ 서부(판포) 하수처리장 방류수 재이용사업 추진(‘08.1~’09.12)

□ 시설용량 : 1일 5,000톤, 총사업비 5,500백만원

❍ 하수처리장 수질원격감시설비(TMS) 설치 : 8개소 1,671백만원(‘08.1~’09.11)

ꏚ 추진실적

❍ 제주하수처리장 고도처리시설사업 추진(‘08년도 8,012백만원)

∙공사착수 : ‘06.11.21(10월현재 공정률 : 82%)

❍ 하수슬러지 자원화시설사업(‘08년도 2,285백만원)

∙실시설계 완료 : ‘08. 7,  공사착수 : ’08. 10. 30

❍ 하수처리장(판포) 방류수 재이용사업 추진(‘08년도 1,000백만원)

∙실시설계 완료 : ‘08. 9,  공사착수 : ’08. 10. 20

❍ 하수처리장 수질원격감시설비(TMS) 설치공사(‘08년도 671백만원)

∙제주 및 남원 완료, 보목․색달 설치중(’08. 11월 시운전)

ꏚ 향후 추진계획

❍ 제주하수처리장 고도처리시설사업 : ‘09. 5월 완료

❍ 하수슬러지 자원화시설사업 : ‘09년말 공정률 70% 추진

❍ 하수처리장 방류수 재이용사업 : ’09. 12월 사업완료

❍ TMS 설치사업(월정,판포,대정,성산) : ’09. 11월 사업완료

지역주민과 함께하는 하수처리장 효율적 운영

❍ 지속적인 시설개량 및 관리운영 체계 강화로 도민이 만족하는 완벽한 하수도 시설관리

❍ 주민과 조화롭게 공생하는 친근한 하수처리장 운영을 위해 지역주민과의 대화 및 현장학습 체험장 확대

ꏚ 시설현황

□ 하수처리장 : 8개소(제주, 동부, 서부, 보목, 색달, 대정, 성산, 남원)

□ 중계 및 간이펌프장 : 316개소(차집관로 : 348㎞)

□ 맨 홀 및 집수구 : 99,321개소

ꏚ 추진개요

□ 빈틈없는 시설물 점검 및 철저한 유지관리로 운영체제 강화

❍ 주민친화형 하수처리장 운영으로 환경시설 인식 전환

□ 뉴제주 운동과 연계하여 하수처리시설 지역주민 봉사활동 전개(월1회)

□ 문화체육시설개방 및 시설견학으로 혐오시설에 대한 인식탈피

□ 주민친화형 문화 체육시설 설치 및 지역주민 대화행정 강화

ꏚ 추진실적

❍ 하수도시설물 준설 및 점검 : 5,700㎥준설, 3,940명 참여

❍ 하수처리장내 주민 문화 체육시설 확충 및 연중개방 : 41,123명

□ 축구장 3면, 테니스장 6면, 영상홍보시설 1개소 등

❍ 지역주민과의 간담회 개최 및 마을행사 참여 등 36회

❍ 하수처리장 주변 정화활동 및 봉사활동 : 20회, 900명

□ 하수처리장 시설견학 및 환경교육 실시 : 2,300여명

ꏚ 향후 추진계획

□ 주민친화형 문화 체육시설 설치(파고라, 배구장, 노을광장, 전망대 등)

□ 하수도 ISO14001 인증 추진 선진국 수준의 환경경영체제 도입

□ 집중호우시 신속한 대응을 위하여 준설업무등 읍․면 위임 검토

지하수 관정의 효율적 관리체계 구축

❍ 지하수 이용시설의 주기적 이용실태 점검ㆍ정비로 지하수 오염방지 및 효율적 관리시스템 구축

❍ 투명한 원수대금 부과를 위한 무인원격검침시스템 도입

ꏚ 배경 및 필요성

❍ 지하수 개발․이용시설의 적정관리 및 소유자, 용도 등 실태조사

❍ 지하수사용량 실시간 파악으로 객관적이고 투명한 원수대금부과

❍ 지하수 이용포기 및 수질불량 등 사용 불가능 관정의 오염방지를 위한 원상복구

ꏚ 추진실적

❍ 사후관리대상 관정 점검 : 3,400공ㆍ500백만원

∙ 전문기관 사후관리대상 관정을 제외한 500톤/일 미만 관정

❍ 지하수이용량 무인원격검침시스템 구축

∙ 개발공사 등 10개 사업장 : 40공․250백만원

(먹는샘물 2개 사업장, 에버리스 골프장외 7개 사업장)

❍ 지하수 원상복구사업 추진 : 214공ㆍ691백만원

∙ 매년 30～50공 지하수 이용포기 등 폐공대상 발생

ꏚ 향후 추진계획

❍ 지하수관정 이용실태 조사 : 3,500공․420백만원

❍ 지하수이용량 무인원격검침시스템 구축 : 60공․450백만원

∙ 골프장 및 관광숙박시설 우선 설치

❍ 지하수 폐공 원상복구사업 : 30공․150백만원

대체수자원 이용기반 확대를 위한 농촌용수개발사업 추진

❍ 빗물․용천수 등 이용가능한 대체 수자원의 적극적 개발․이용

❍ 지하수 일변도의 농업용수 공급 다원화로 지하수의 적정관리 및 효율적 이용

ꏚ 추진목표 : 농업용수 지하수 의존율 - ‘07년(98%) ⇒ ’16년(86%) 감축

ꏚ 사업개요

❍ ‘16년까지 저수지 등 대체수자원 개발(17개지구 959.8만톤ㆍ3,060억원)

∙ 완성된 사업 : 지표수 5개소․125.2만톤, 48억원

(용수, 어승생, 귀엄, 광령저수지, 제동목장)

∙ 진행중인 사업 : 2개소․188.6만톤, 905억원

- 성읍지구 : 125만톤 482억원

- 옹포지구 : 63.6만톤 423억원

∙ 향후추진계획 : 10개소․646만톤, 2,107억원

(함덕, 서림ㆍ신도, 어승생2저수지, 농업용대체수자원개발(7개소))

ꏅ 추진실적

□ 성읍(‘03～’13) : ‘08까지 181억원 투입(공정률 37%), 향후 301억원

□ 옹포(‘06～’16) : ‘08까지  79억원 투입(공정률 19%), 향후 344억원

□ 함덕․송당 실시설계 : ‘08. 12월 완료

ꏅ 향후 추진계획

□ 대체 수자원 이용기반 확대(농업용 저수지개발)

∙ 성읍, 옹포지구의 사업추진(40억 - 성읍 20억, 옹포 20억)

- 사업부지 토지매입, 저수지 조성공사, 구조물 시설 등

∙ 함덕․송당지구(350만톤, 460억원) : 신규착수 추진

∙ 서림지구(50만톤, 360억원)의 기본조사지구 선정 등 대중앙절충 강화

수자원의 다원화를 위한 빗물이용시설 활성화

❍ 골프장 및 농업용수 등 지하수를 많이 사용하는 사업장에 대하여 빗물이용 설치지원 확대로 빗물자원의 효율적 활용

❍ 빗물이용시설 확대에 따른 지하수 이용량 감소

ꏅ 사업개요

□ 의무 설치대상 : 골프장(6만㎡이상), 온천개발(면적 10만㎡이상) 등

- ‘08까지 : 골프장 21개소, 2,835천톤

∙‘07년 : 빗물이용 61.6%(지하수 3,470천톤, 빗물 5,568천톤)

∙‘08년 9월 : 빗물이용 59.1%(지하수 2,535천톤, 빗물 3,657천톤)

□ 권장대상 : 비닐하우스 및 온실 등 10톤이상 설치한 경우

- ‘08까지 : 19개소․2,341톤, 242백만원 지원

ꏅ 추진방향

□ 일정규모 이상 공공기관 청사, 비닐하우스․유리온실 등에 대하여 의무적 빗물이용시설 설치대상 포함 확대추진

□ 권장대상 빗물이용시설 지원사업 확대 추진

□ 의무적 빗물이용 기준수량 준수확인 등 행정지도 강화

ꏅ 향후 추진계획

□ 의무적 빗물이용시설 설치대상(유리온실 등) 확대

☞ 워터비전 2030 추진과정에 기초조사 연구후 조례반영 추진

- 지하수개발ㆍ이용 및 빗물이용현황, 기상수문 및 물수지 분석, 수자원 이용량 분석 등

□ 빗물이용 의무대상

☞ ‘09년 설치예정 골프장 : 3개소 64만톤

□ 권장대상 : 40개소․5천톤, 500백만원 지원

도 전역의 안정적 용수공급체계 구축

❍ 서부지역 Ⅱ단계 사업 완공으로 도전역 광역용수공급체계 구축

❍ 광역상수도와 연계시설이 미비한 지역의 용수공급시설 확충

❍ 어승생 제2저수지 건설을 통한 중산간지역 근원적 물 문제 해소

ꏚ 사업개요

❍ 광역상수도(Ⅱ)건설사업 추진

∙총사업비 : 100,092백만원(‘00년 ~ ’08년)

∙시설용량 88천톤/일(정수장 4개소), 도․송수관로 94.3㎞ 등

❍ 광역상수도 연계사업 추진

∙총사업비 : 29,576백만원(‘05년 ～ ’11년)

∙읍․면지역 16개 지구(배수지 신설 14지, 관로 67.7km 등)

❍ 어승생 제2저수지 건설사업 추진

∙총사업비 : 48,000백만원(‘07년 ～ ’11년)

∙저수시설 50만톤, 정수시설 1만톤, 도수관 5.89㎞, 송수관 5.97㎞

ꏚ 추진실적

❍ 광역상수도(Ⅱ)건설사업 : 공정률 97%(‘08년 마무리 추진)

- ‘08년 사업비 4,704백만원(관로 0.76㎞, 감시정 7공, 중앙통제실 등)

❍ 광역상수도 연계사업 : 8개지구⇒13,039백만원(배수지 7지, 관로 29.1㎞)

- ‘08년(4,122백만원) : 3개지구(애월,덕천,성읍)⇒배수지 2지, 관로 10㎞, 공정율 70%

❍ 어승생제2저수지 건설사업 실시설계용역 착수 : ‘08. 5. 13

ꏚ 향후 추진계획

❍ ‘09년 어승생 제2저수지 건설사업 사전 행정절차 이행 및 착공(40억원)

- 사전환경성검토, 사전재해영향성검토, 개발행위허가, 자연공원행위허가 등

❍ 광역상수도 연계사업 추진 : 8개지구⇒16,537백만원(배수지 7지, 관로 38.6㎞)

- '09년(7,646백만원) 추진 : 4개지구(한경,신양,토산,삼달)⇒배수지 3지, 관로 15.7㎞

2007 결산 및

2008 예산집행 현황

2007년도 결산 및 2008년도 예산 집행현황

《 상수도사업특별회계 》

❏ 2007년도 결산내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용률
상수도사업특별회계	70,659	56,331	8,205	6,123	8.7

❏ 2008년도 예산 집행현황(2008. 10월말 현재)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	집행액	미집행액	집행률
상수도사업특별회계	74,568	56,965	17,603	76.4

□ 미집행내역                                        (단위 : 백만원)

구 분	잔 액	세 부 내 역
합 계	17,603
인 건 비	3,868	∙정규직 ․비정규직․기타직보수 등
운영비 등	2,885	∙일반운영비․여비․업무추진비․재료비․수선교체비 등
급수공사비	1,743	∙급수공사비
투자사업비	4,165	∙상수원보호구역 주민편익사업 77 ∙한동배수지 확장공사 246 ∙삼화 택지개발지구 용수공급사업 950 ∙우도 해저상수도 시설사업 1,310 ∙예비용 수중모터 및 정량펌프구입 190 ∙금산취수원 무인시스템구축 180 ∙수원지 등 녹조방지용 폭기시설설치 125 ∙취․정수장 펌프, 시설물 교체 177 ∙제주지역사업소 노후관 교체 483 ∙서귀포지역사업소 노후관 교체 427
지방채상환	4,269	∙원금 2,690 이자 1,579 (4/4분기 상환예정액)
예 비 비	673	∙예비비

□ 집행계획

• 향후 집행예정액 : 12,569백만원

• 최종 집행잔액   :  5,034백만원(세출예산의 6.8%)

※ 집행잔액 내역 - 경상비 10% 절감(0.9%)   :   639백만원

입찰등 집행잔액(2.9%)    : 2,185백만원

예비비 등(3.0%)          : 2,210백만원

《 하수도사업특별회계(공기업) 》

❏ 2007년도 결산내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용률
하수도사업특별회계 (공기업)	56,307	39,657	12,211	4,439	7.88

❏ 2008년도 예산 집행현황(2008. 10월말 현재)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	집행액	미집행액	집행률
하수도사업특별회계 (공기업)	48,592	33,616	14,976	69.2

□ 미집행내역                                        (단위 : 백만원)

구 분	잔 액	세 부 내 역
합 계	14,976
인 건 비	872	∙정규직 ․비정규직․기타직보수 등
운영비 등	1,670	∙일반운영비․여비․업무추진비․재료비․수선교체비 등
투자사업비	11,578	∙제주시 동지역 하수관거정비 7,471 ∙2008 하수관거 BTL사업 운영준비 650 ∙하수슬러지 자원화 시설사업 2,285 ∙고도처리시설사업 396 ∙하수처리장 예비펌프구입 86 ∙하수도준설사업 127 ∙소규모 주민건의 해소사업 47 ∙하수도보수사업 66 ∙연동 은남5로 “걷고싶은거리”분류식 하수관거시설 공사 등 450
지방채상환	324	∙원금 263 이자 61 (4/4분기 상환예정액)
예 비 비	532	∙예비비

□ 집행계획

• 향후 집행예정액 : 12,998백만원

• 최종 집행잔액   :  1,978백만원(세출예산의 4.1%)

※ 집행잔액 내역 - 경상비 10% 절감(1%)   :  480백만원

입찰등 집행잔액(2%)    :  966백만원

예비비 등(1.1%)        :  532백만원

《 하수도사업특별회계(기타) 》

❏ 2007년도 결산내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용률
하수도사업특별회계 (기타)	27,219	20,272	5,880	1,067	3.9

❏ 2008년도 예산 집행현황(2008. 10월말 현재)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	집행액	미집행액	집행률
하수도사업특별회계 (기타)	17,659	12,661	4,998	71.7

□ 미집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	잔 액	세 부 내 역
합 계	4,998
인 건 비	54	․무기계약근로자보수
운영비등	337	․일반운영비 ․여비 ․업무추진비 ․재료비
경상이전	-	․민간위탁금
투자사업	2,691	․서귀포시 동지역 하수관거정비사업 1,975 ․서귀포시 동지역 하수도시설유지관리 300 ․보목,색달하수처리장 시설물정비사업 등 416
공기업자본전출금	120	․공기업특별회계자본전출금 120
예비비	1,796

□ 집행계획

• 향후 집행예정액 :  2,817백만원

• 최종 집행잔액   :  2,181백만원(세출예산의 12.3%)

※ 집행잔액 내역 - 경상비 10% 절감(1.4%)   :   236백만원

입찰등 집행잔액(0.8%)    :   149백만원

예비비 등(10.1%)         :  1,796백만원

《 일 반 회 계 》

❏ 2007년도 결산내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용률
일 반 회 계 (하수도)	55,961	52,342	2,810	809	1.4

❏ 2008년도 예산 집행현황(2008. 10월말 현재)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 현 액	집 행 액	미집행액	집 행 률
일 반 회 계 (하수도)	61,882	45,699	16,183	73.8

□ 미집행내역                                      (단위 : 백만원)

구 분	잔 액	세 부 내 역
합 계	16,183
인 건 비	69	․수당 ․기타직보수 ․기간제근로자등보수 등
운영비등	915	․일반운영비 ․여비 ․업무추진비 ․재료비
경상이전	191	․사회보장적수혜금 ․행사실비보상금 ․민간위탁금
투자사업	11,054	․제주시 읍면지역 하수관거 정비사업 4,570 ․서귀포시 읍면지역 하수관거 정비사업 1,966 ․하수처리장 방류수재이용사업 1,000 ․제주시 농어촌마을하수도 정비사업 912 ․소규모하수관정비 350 ․‘08 하수관거정비 BTL사업 운영준비금 400 ․서귀포시 농어촌마을하수도 정비사업 66 ․읍면지역하수처리장 및 위생처리장 시설물정비사업 등 1,790 (하수처리장 5개소, 위생처리장2개소)
공기업자본전출금	796	․공기업특별회계자본전출금
지방채상환	2,998	․원금 1,600 이자 1,398 (4/4분기 상환예정)
국고보조반환금	160	․국고보조반환금

□ 집행계획

• 향후 집행예정액 : 14,336백만원

• 최종 집행잔액   :  1,847백만원(세출예산의 3%)

※ 집행잔액 내역 - 경상비 10% 절감(0.7%)   :   435백만원

입찰등 집행잔액(2.3%)    :  1,412백만원

《 개발사업특별회계 》

❏ 2007년도 결산내역

(단위 : 백만원, %)

세 항	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용률
광역수자원 관리본부운영	770	421	347	2	0.2

《 지하수관리특별회계 》

❏ 2007년도 결산내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용률
지하수관리특별회계	15,819	13,303	2,380	136	0.8

❏ 2008년도 예산 집행현황(2008. 10월말 현재)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	집 행 액	미집행액	집 행 률
지하수관리특별회계	12,070	6,209	5,861	51

□ 미집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	잔 액	세 부 내 역
합 계	5,861
경상적경비	28	∙일반운영비․여비․업무추진비 등
투자사업비	5,115	∙지하수계량기 교체사업 8 ∙광역상수도 2단계 건설사업 2,816 ∙농어촌 생활용수 개발사업 2,291
민간자본보조	86	∙빗물이용시설 설치 지원 86
차입금이자상환	320	∙시․도지역개발기금차입금이자상환 194 ∙중앙정부차입금이자상환 126
예 비 비	312

□ 집행계획

• 향후 집행예정액 : 4,968백만원

• 최종 집행잔액   :   893백만원(세출예산의 7.4%)

※ 집행잔액 내역 - 입찰 등 집행잔액(4.8%) : 581백만원

- 예비비(2.6%) : 312백만원

소관 입법현황

소관 입법(조례․규칙) 현황

❏ 조 례

부서별	조례명	법적근거	입법목적	제정일	공포일	시행일 (최종 개정일)
경 영 관리과	제주특별자치도수도사업지방직영기업설치조례	지방공기업법 제5조, 제9조, 제13조, 제27조, 제36조, 제37조	제주특별자치도 상수도사업의 직영기업 전환 운영을 위하여 설치조례 제정	2007. 3. 7	2007. 3. 7	2007. 3. 7
“	제주특별자치도 수도급수조례	수도법 제30조, 제38조 및 같은법 시행령 제65조	수도법 및 동법시행령에서 정하도록 한 사항에 대하여 수도급수 조례 제정	2006. 11. 29	2006. 11. 29	2006. 11.29 (2008. 1. 2)
상수도관리부	제주특별자치도 수질검사수수료 등 징수 조례	먹는물관리법 제5조, 지하수법 제20조	먹는물관리법 및 지하수법에 의한 민원수질검사에 따른 검사수수료 징수 등을 위하여 조례 제정	2007. 4. 4	2007. 4. 4	2007. 4. 4
하수도 관리부	제주특별자치도 하수도사용조례	하수도법 제15조, 제27조, 제41조, 제32조, 제61조	하수도법 및 같은법 시행령에서 정하도록 한 사항에 대하여 하수도사용조례 제정	2008. 7.16	2008. 7.16	2008. 7.16
수자원개발부	제주특별자치도 지하수관리기본 조례	제주특별자치도설치및국제자유도시 조성을 위한 특별법 제310조 내지 제322조	특별자치도 특별법에서 위임된 지하수자원의 체계적이고 합리적 보전․관리를 위한 필요 사항을 규정	2006. 4. 12	2006. 4. 12	2006. 7. 1 (2007.4.4)

❏ 규 칙

부서별	규칙명	법적근거	입법목적	제정일	공포일	시행일 (최종개정일)
경 영 관리과	제주특별자치도지방직영기업회계규칙	지방공기업법시행령 제46조	제주특별자치도 지방직영기업의 회계운영에 관하여 필요한 사항을 규정	2007. 6. 20	2007. 6. 20	2007. 6.20 (2008.4.16)
“	제주특별자치도수도급수조례시행규칙	수도법 제30조, 제38조 및 같은법시행령 제65조	「수도급수조례」에서 위임된 사항과 급수조례의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2006. 6. 28	2006. 6. 28	2006. 7. 1
하수도 관리부	제주특별자치도 하수도사용조례시행규칙	하수도 사용조례 제3조내지 제19조	「하수도사용조례」에서 위임된 사항과 조례의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2006. 6. 28	2006. 6. 28	2006. 7. 1
수자원개발부	제주특별자치도지하수관리 기본조례시행규칙	「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제 310조 내지 제322조	「제주특별자치도지하수관리기본조례」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정	2006. 6. 28	2006. 6. 28	2006. 7. 1

2007 행정사무감사

지적사항 시정조치결과

시정 및 처리요구사항

1. 지하수 원수대금 3개월 이상 체납자에 대하여는 단수조치 등 징수

방안을 강구하기 바람.

처리결과

� 지하수 원수대금 체납현황

○ ‘08년도분(9월말 현재)

(단위 : 건,백만원)

구 분	조정액		징수액		체납액		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	8,925	4,957	8,467	4,815	458	142	97.1
제 주	5,681	3,321	5,296	3,188	385	133	96.0
서귀포	3,244	1,636	3,171	1,627	73	9	99.4

○ 과년도분(‘08. 9월말 현재)

(단위 : 건,백만원)

구 분	조정액		징수액		체납액		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	56,488	30,491	55,511	30,293	977	198	99.4
2007	12,038	6,223	11,506	6,137	532	86	98.6
2006	12,088	6,584	11,829	6,539	259	45	99.3
2005이전	32,362	17,684	32,176	17,617	186	67	99.6

� 추진실적

○ 가산금 부과실적 : 1,372건․12백만원

○ 과년도 체납액 징수 실적 : 75건․46백만원

○ 압류조치 : 4건․132백만원

○ 매월 고지서 교부시 납부 독촉장 발부 및 방문 징수독려 월1회이상

○ 원수대금 체납시 지하수 연장허가 제한사항 안내문 발송 : 2회

� 체납자에 대한 향후 조치계획

○ 체납자중 지하수 연장허가 대상에 대해서는 연장허가 제한

○ 상습․고액체납자에 대한 행정제재 및 압류조치(지방세법 제28조)

○ 체납자에 대해서는 가산금을 부과함으로써 납부기간내에 납부할

수 있도록 유도(지하수관리기본조례 59조5항)

○ 납부방법(자동이체, 카드등)을 다양화하여 체납기간 단축 및  체납액 분할납부 유도

※ 체납자 단수조치에 따른 단전 업무협의(한국전력공사 제주지사장)

- 지하수 원수대금 징수관련 문제는 전기사업법 위반과는 직접적      연관성이 없으므로 전기공급 중지 할수 없음.

처리상황

완결(  ○  ), 추진중(     ), 추진불가(     )

시정 및 처리요구사항
2. 제주 물 환경 학습공원 조성사업과 해군기지 유치 지원사업이 중복되지 않도록 부서간 업무협력을 통하여 통합된 계획으로 추진할 수 있는 방안을 강구하기 바람.
처리결과
□ 조치계획 □ 제주물환경학습공원 조성계획은 제주해군기지 건설사업이 공론화되기 이전인 2004년도부터 수자원본부에서 추진해온 사업으로서, 제주도 물환경의 특성은 물론 수문지질, 지하수의 생성과 순환, 물 이용 역사 등을 체계적으로 교육하고 체험할 수 있는 종합적인 교육·학습시설을 조성하는 것을 주요 사업내용으로 하고 있는 사업이며 □ 서귀포시에서 제주해군기지유치지원사업(안)에 포함시킨 「물공원」사업은 수자원본부가 추진하던 제주물환경학습공원 조성사업과 동일한 사업이며, 향후 서귀포시에서 동 사업을 추진코자 할 때에는 적극 협조하여 나갈 것임.
처리상황	완결( ○ ), 추진중( ), 추진불가( )

제248회 임시회

도정질문ㆍ답변에 따른 추진상황

도정질문ㆍ답변에 따른 추진상황

의 원 명	김행담 의원
질문요지	○ 빗물이용 활성화 계획 - 빗물이용 활성화를 위한 종합계획 수립방안 - 의무적 빗물이용시설 설치대상 확대 계획 - 빗물이용 활성화를 위한 기초조사 연구 계획
답변요지	○ 수자원관리 종합계획 수립 연구에 빗물이용시설에 관한 사항 포함 ○ 의무적 빗물이용시설 설치대상 확대 추진 ○ 빗물이용에 대한 기초조사 등 종합적 연구 추진
추진상황	□ 추진실적 ○ 의무설치대상 - ‘08까지 : 골프장 21개소, 2,835천톤 ∙‘07년 : 빗물이용 61.6%(지하수 3,470천톤, 빗물 5,568천톤) ∙‘08년 9월 : 빗물이용 59.1%(지하수 2,535천톤, 빗물 3,657천톤) ○ 권장설치대상 - ‘08까지 : 19개소․2,341톤, 242백만원 지원 ○ "Jeju Water Vision 2030" 세부연구계획 수립 및 연구팀 구성 □ 향후 추진방향 및 계획 ○ "Jeju Water Vision 2030" 추진과정에서 기초조사 연구 후 빗물이용시설 관련 조례반영 추진 ○ 기초조사 후 일정규모 이상 공공기관 청사, 비닐하우스 ․유리온실 등에 대하여 의무적 빗물이용시설 설치대상 포함 확대추진 ○ 권장대상 빗물이용시설 지원사업 확대 추진 ○ 의무적 빗물이용 기준수량 준수확인 등 행정지도 강화

2008 행정사무감사자료

(총 77건 : 공통 16, 소관 61)

공   통   사   항

공  통  사  항

1. 다수인 민원 처리현황

접수 일자	민 원 인		민 원 내 용	처 리 결 과		비고
	주소 및 성 명	연락처		처리 일자	처 리 내 용
‘06.11.20	도두1동 2623-4 (도두1동 마을회장 고영율)	011-691- 9981	하수처리장 가동으로 인한 피해보상 요구	‘08.05.31	ㅇ주민지원사업 추진 - 도두1동 : 수산물판매시설 (1,958㎡, 1,300백만원) - 신사수동 : 마을복지 회관 (842㎡, 600백만원)	하수도관리부
‘07.12.13	제주시 영평동 1913-3 (영평상동 마을회장 김성만)	011-692- 5150	제주첨단과학기술단지 진입도로 개설공사시 하수도시설 설치요망	‘07.12.28	ㅇ현시점에서는 도시계획에 의한 개발계획 등이 없어 하수도 신설계획이 없는 실정이나, ㅇ향후 자연녹지지역등에 대한 하수관거시설계획 기준안을 수립하여 단계별 우선순위에 의한 효율적인 하수관거 시설 계획임	“
‘08.08.06	서귀포시 법환동 326번지 (현우남외4인)	016-9550- 5782	우천시 발생하는 상류지역 우수로 인한 상습 농경지 침수와 관련오수관 공사와 병행하여 우수관 매설 요청	‘08.08.13	ㅇ지방도 1132호선에서 세기레미콘입구까지 650m 구간중 220m우수관 부설 ㅇ 하수처리구역 외 농경지 침수사항은 별도의 배수처리사업으로 시행필요 - 관련부서 통보	“

2. 청원서 처리현황(의회 접수 이송된 청원)

- 해당사항 없음

3. 진정서 처리현황(의회 접수 이송된 진정)

- 해당사항 없음

4. 각종위원회 현황 및 운영실적

❏ 제주특별자치도 수돗물평가위원회

□ 설치근거 : 수도법 제30조 및 제주특별자치도수도급수조례 제48조

□ 구    성 : 10인 이내(당연직 1, 위촉직 9)

※ 당연직 : 상하수도본부 상수도관리부장

□ 기    능

∙ 수돗물의 정기적인 수질검사 실시 및 공표

∙ 수도사업자에 대한 수질관리 및 수도시설의 운영에 대한 자문

∙ 수돗물 수질과 관련하여 도지사가 요청하는 사항 등

□ 임    기 : 2008. 8. 16 ~ 2010. 8. 15(2년)

□ 운영실적

구 분	계	회의개최	수질검사 실시	수질검사 결과공표	비 고
건 수	24	12	8	4
2006년	6	4	1	1
2007년	10	5	3	2
2008년	8	3	4	1

□ 위원회 명단

구 분	위 원 명	비 고
위원장	김원형	(현)제주대 화학과 교수 (전)제주시 수돗물 평가위원
부위원장	김태성	(현)제주YMCA사무총장 (전)제주시 수돗물 평가위원
위 원	강익상	(현)제주시 조천읍 주민자치위원회 위원 (전)북제주군 수돗물 평가위원장
	강진옥	(현)서귀포시 자원봉사센터운영위원 (전)서귀포시 수돗물 평가위원
	문창기	(전)광역수자원관리본부 기술담당관 (현)건설기술심의위원회위원
	문춘옥	(현)제주시의 제21협의회운영위원 (전)제주시 농협부녀회 회장
	박은옥	(현)제주대 간호학과 교수 서울대 보건학 석사․박사
	황홍자	(현)한국음식업중앙회제주시지부장
	강명희	(현)여성특별위원회 위원
	양윤호	(현)상하수도본부 상수도관리부장

❏ 지하수관리위원회

❍ 구성일시 : 2000. 12. 27

❍ 관계법령 : 제주특별자치도 특별법 제315 및 지하수관리기본조례 제33조

❍ 임    기 : 2006. 11. 27 ~ 2008. 11. 26(2년)

❍ 운영실적

구 분	개최횟수	개 최 내 용	비 고
2006	12	- 지하수개발․이용 및 변경허가 - 지하수개발․이용 연장허가 - 제주물환경학습공원조성사업 중간보고 자문
2007	8	- 지하수개발․이용 및 변경허가 - 지하수개발․이용 연장허가 - 물산업육성기본계획(안) 자문
2008	6	- 지하수개발․이용 및 변경허가 - 지하수개발․이용 연장허가 - 지하수보전 및 이용정책 수립을 위한 자문

❍ 위원회 명단

구 분	직 위	성 명	소 속(직 위)
당연직	위원장	장 철	제주특별자치도 상하수도본부장
	위 원	김행담	제주특별자치도의회 의원
		이영웅	제주환경운동연합 사무국장
		김양보	환경정책과장
		김대준	상하수도본부 수자원개발부장
위촉직	부위원장	최영찬	제주대학교 해양과학부 교수
	위 원	양성기	제주대학교 해양과학부 교수
		현해남	제주대학교 생명공학부 교수
		이용두	제주대학교 해양과학부 교수
		진성원	한국지하수협회(부설)지하수기술연구원장
		정광옥	탐라대학교 토목환경공학과 교수
		박신영	제주한라대학 임상병리과 교수
		강다원	제주관광대학 관광외식조리계열 교수
		현혜자	한국지질자원연구원 선임연구원
		박원배	제주발전연구원 연구지원기획실장

5. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

(단위 : 천원)

년도별	사업명	보조대상	보조금액	정산액	사업내용	비 고
2006	동서부하수처리장 유치마을 지원사업	월정리 어촌계	150,000	150,000	․수산물직판장 1동 511㎡	하수도 관리부
	동서부하수처리장 유치마을 지원사업	김녕리 어촌계	150,000	150,000	․마을 구판장 1동 466㎡	“
	태흥리어촌계 소라종폐사업	태흥리어촌계	50,000	50,000	․소라종폐방류	“
	세화2리 게이트볼장 및 청소년체육시설조성	세화2리	30,000	30,000	․게이트볼장 시설	“
	서부광역하수종말처리장 해양방류관로 매설주변 수중촬영	모슬포선주협회	10,000	10,000	․해양방류관로 매설주변 수중촬영	“
	위미1리 소공원 조성	위미1리	30,000	30,000	․소공원 조성	“
	신사수동 마을회 마을복지회관 신축	신사수동 마을회	150,000	150,000	․마을복지회관 842㎡	“
	빗물이용시설 설치비 지원	빗물이용시설 설치자(4개소)	27,550	27,550	․지하수인공함양정 3개소 (20천톤/년 함양) ․소형빗물이용시설 1개소(100톤)	수자원 개발부
2007	동서부하수처리장 유치마을 지원사업	판포리 어촌계	500,000	500,000	․복지회관 1동 ․잠수탈의장 1동 530㎡	하수도 관리부
	동서부하수처리장 유치마을 지원사업	월령리 어촌계	200,000	200,000	․패조류 투석 4ha ․복합형 어초 36EA	“
	동서부하수처리장 유치마을 지원사업	김녕리 어촌계	200,000	200,000	․마을 구판장 1동 466㎡	“
	마을 복지회관 신축	신사수동 마을회	450,000	450,000	․마을복지회관 842㎡	“
	도두어촌계 수산물 판매시설 신축	도두어촌계	500,000	500,000	․수산물판매시설 1,958㎡	“
	빗물이용시설 설치비 지원	빗물이용시설 설치자(6개소)	70,000	70,000	․지하수인공함양정 1개소 (3천톤/년 함양) ․소형빗물이용시설 5개소(872톤)	수자원 개발부
	삼양3동 마을어장피해에 따른 자원회복사업	삼양동어촌계	30,000	30,000	․마을어장 복원사업 (갯닦기 사업 1식)	제주지역 사업소
2008	도두어촌계 수산물 판매시설 신축	도두어촌계	800,000	800,000	․수산물판매시설 1,958㎡	하수도 관리부
	하수처리시설 주변지역 경상경비 지원	삼양동어촌계 외 5	24,000	24,000	․경상경비 지원	“
	마을어장피해에 따른 자원회복사업	삼양동어촌계	9,900	9,900	․갯닦이 사업	“
	빗물이용시설 설치비 지원	빗물이용시설 설치자(10개소)	129,000	129,000	․지하수인공함양정 3개소 (32천톤/년 함양) ․소형빗물이용시설 7개소(800톤)	수자원 개발부

6. 민간위탁금 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	사업명	위탁기관	사업비	사업기간	위탁내용	비 고
2006	제주시 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	350,000	2006.3.1 ~ 2007.2.28	제주시위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	하수도 관리부
	동.서부 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	547,900	2006.1.1 ~ 2006.12.31	동․서부위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“
2007	제주시 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	358,180	2007.3.1 ~ 2008.2.29	제주시위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“
	동.서부 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	640,000	2007.1.1 ~ 2007.12.31	동․서부위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“
2008	제주시 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	310,900	2008.3.1 ~ 2008.12.31	제주시위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“
	동.서부 위생처리장 민간위탁	(주)경원산업	679,000	2008.1.1 ~ 2008.12.31	동․서부위생처리장 운영 및 유지관리 전반 민간위탁	“

7. 각종 기금적립 및 운용실적(최근 3년간)

- 해당사항 없음

8. 용역발주현황

❏ 2006년도

(단위 : 백만원)

용역명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역기간	용역 종류	계약 일자	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
농어촌마을하수도 실시설계용역	26	기본조사 및 실시설계	(주)도암 엔지니어링 외 1	‘06.12.21 ~‘07.02.18	기술 용역	‘06.12.21	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	공사발주자료로 활용	하수도 관리부
주민숙원 하수관거사업 실시설계 용역	34.8	하수도 정비 L=2.5km	(주)한일 엔지니어링	06.9.25 ～07.5.22	기술 용역	06.9.22	경쟁 입찰	지방계약법 제9조 동법시행령 제16조	공사완료	제주지역사업소
서귀포시 상수도 관망 전산화 용역	131	상수도 관망도 전산화 L=1,880km	자바 정보기술㈜	06.09.18.~12.26.	기술 용역	‘06.9.18	제한 경쟁	지방계약법 제9조 동법시행령 제20조	상수도 관망도 전산화 구축 및 관리	서귀포지역사업소

❏ 2007년도

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역금액	용역내용	용역기관	용역 기간	용역 종류	계약 일자	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
삼화지구 용수공급 기본 및 실시설계 용역	23.8	삼화지구 택지개발사업과 관련하여 삼화지구 및 주변지역에 안정된 용수 공급을 위한 기본 및 실시설계 용역1식	(주)제원엔지니어링 외1	07. 8. 9 ~11. 16	기술 용역	‘07.8.9	견적 입찰	지방계약법 시행령 제25조 제5호	삼화지구택지개발사업에 따른 삼화지구 및 주변지역 원활한 상수도 공급사업에 활용	상수도 관리부
아라가압장 전기설비공사 감리용역	10	전력 기술관리법 제12조의 규정에 의한 아라가압장 고압전기설비공사에 따른 공사감리 용역	(주)도암엔지니어링건축사	07.10.2 ~‘08.5.22	기술용역	‘07.10.2	견적입찰	지방계약법 시행령 제25조 제5호	아라가압장 전기설비 공사에 활용(완료)	“
어승생저수지및 광역정수장 안전성 정밀점검용역	22	저수지 시설 1개소 광역정수장 5개소 안전성 정밀점검용역	산업안전 관리(주)	07.10.23 ~12.7	기술용역	‘07.10.23	견적입찰	지방계약법 시행령 제25조 제5호	어승생저수지 보강 및 광역정수장 유지보수에 활용(완료)	“
중계펌프장 발전기실 증축 및 전기실 개보수 설계용역	11	병문중계펌프장 증축 실시설계	건축사사무소아름다운집	‘07.2.20 ~4.21	기술 용역	‘07.2.20	견적입찰	지방계약법 시행령 25조	공사발주자료로 활용	하수도 관리부
중계펌프장 비상발전기 및 예비전기설비 설치 실시설계용역	31	병문중계펌프장외 5개소 비상발전기 설치 실시설계	(주)청운엔지니어링	‘07.2.20 ~4.23	기술 용역	‘07.2.20	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	공사발주자료로 활용	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역금액	용역내용	용역기관	용역 기간	용역 종류	계약 일자	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
제주시 읍면지역 간이오수처리시설관리용역	69	간이오수처리시설 27개소	흥산환경 건설(주)	‘07.3.20 ~‘08.2.28	기술 용역	‘07.3.20	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	간이오수처리시설 의 관리 업무추진	하수도 관리부
서귀포시 농어촌 마을하수도 개량사업 실시설계 용역	24	기본조사 및 실시설계	상원 엔지니어링 외1	‘07.04.18 ~.06.17	기술 용역	‘07.4.18	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	공사발주자료로 활용	“
제주시 농어촌주거환경개선사업실시설계용역	25	신설 1개소 관거시설 1식	(주)상아 엔지니어링	‘07.5.23 ~.8.10	기술 용역	‘07.5.23	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	추자 묵리 농어촌주거환경개선사업시행	“
광역하수도정비 기본계획 수립용역	1,219	기존 4개 시군 체계의 하수도계획통합 및 기본계획 수립	(주)삼안	‘07.8.13 ～ ‘09.2.13	기술 용역	‘07.8.10	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	도전체의 하수도 종합계획 및 광역화 계획 수립	“
제주시농어촌 마을하수도개선사업실시설계용역	37	개량 8개소 정비 1식	(주)상아엔지니어링	‘07.8.24 ~.10.22	기술 용역	‘07.8.24	수의 계약	지방계약법 시행령 26조	농어촌마을하수도개선사업시행	“
제주시 동지역 하수관거정비사업 전면책임감리용역	1,670	하수관거 L=47㎞ 정비공사 전면 책임감리	(주)경호엔지니어링외 1	‘07.9.4 ~‘10.9.3	기술 용역	‘07.8.31	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	감리업무 수행	“
제주시 읍면지역 하수관거정비사업실시설계용역	825	하수관거 실시설계 L=45km	(주)건화 외 1	‘07.9.11 ~‘08.9.12	기술 용역	‘07.9.5	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	제주시읍면지역하수관거정비사업시행	“
서귀포시(읍면지역)하수관거정비 기본 및 실시설계용역	1,056	하수관거 L= 68.1Km	(주)건화 외 1	‘07.09.19 ~‘08.02.18	기술 용역	‘07.9.19	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	공사발주자료로 활용	“
보목처리장 해양방류관시설보강공사설계용역	13	기본조사 및 실시설계	(주)성광종합기술개발	‘07.9.27 ~10.26	기술 용역	‘07.9.20	견적 입찰	지방계약법 시행령 25조	공사발주 자료로 활용	“
제주시 동부 및 서부분뇨처리장 기술진단 용역	70	동부 및 서부분뇨처리장 기술진단	환경관리공단	‘07.10.15 ~12.28	기술 용역	‘07.10.15	수의 계약	지방계약법 시행령 25조	시설개선 자료로 활용	“
서귀포시 농어촌마을하수도개량사업 실시설계용역	37	마을하수도신설1개소 개량1개소	(주)제원엔지니어링 외1	‘07.11.9 ~‘08.1.21	기술 용역	‘07.11.9	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	공사발주자료로활용	“

용 역 명	용역금액	용역내용	용역기관	용역 기간	용역 종류	계약 일자	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
어승생제2저수지 건설사업 타당성조사 및 기본계획 용역	104	용수수급계획 검토 최적개발규모 사업비산정 및 경제성평가	(주)남원 건설엔지니어링	‘07.2.23 ~12.19	기술용역	‘07.2.23	일반경쟁	지방계약법 제 16조	어승생제2저수지 건설 경제성분석 및 실시설계에 활용	수자원개발부
제주도(Ⅱ) 광역상수도사업 시설공사 전면책임감리 용역(6차분)	654	제주도(Ⅱ)광역상수도사업 시설공사 전면책임감리용역	㈜유신코퍼레이션 외1	‘07.2.21 ∼12.22	기술 용역	‘07.2.21	일반 경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술관리법에 의한 책임감리 시행 공사품질 확보	“
광역상수도 관로연계사업 실시설계용역	154	배수지시설3개소 관로연계 15㎞ 지형현황측량 (배수지부지, 관로) 토질조사 보상물조사	(주)건설엔지니어링	‘07.4.11 ~9.7	기술용역	‘07.4.11	제한경쟁	지방계약법 시행령 제 16조	조천지구 공사발주(07.10월) 구좌덕천지구 애월광령지구 한경저지지구 공사발주에 활용	“
제주시지역 지하수관정 사후관리(도지사 관리민간 위탁용역)	25	도지사에 의한 사후관리 관정점검 300공	(주)우성엔지니어링 기술사 사무소	‘07.5.11 ~7.19	일반 용역	‘07.5.11	견적입찰	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
서귀포시 동부지역지하수 관정사후관리(도지사관리 민간위탁용역)	24	도지사에 의한 사후관리 관정점검 300공	(주)성광종합기술개발	‘07.5.11 ~7.19	일반 용역	‘07.5.11	견적입찰	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
서귀포시서부지역지하수 관정사후관리 (도지사관리 민간위탁용역)	32	도지사에 의한 사후관리 관정점검 400공	남천개발	‘07.6.08 ~8.16	일반 용역	‘07.6.8	견적입찰	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
상수도 누수탐사 및 블록화 사업용역	487	누수탐사: 626Km 블록화 : 2구역	(주)한국빅텍	07.6.14 ~08.1.17	기술용역	07.6.14	지명경쟁	지방계약법 제9조 동법시행령 제22조	누수발견 : 223개소 누수방지량 : 18,225톤/일 11백만원/일 경제효과	제주지역사업소
제주동중학교 동측외 3개소 하수도정비공사실시설계용역	18	하수도 정비 L=0.937km	(주)범영엔지니어링	07.9.28 ～07.10.17	기술 용역	07.9.21	경쟁 입찰	지방계약법 제9조 동법시행령 제16조	하수도정비공사 발주 및 준공	“
용담동 한천외 시일원 하수도 정비공사 실시 설계용역	26.9	하수도 정비 L=2.0157km	(주)건설엔지니어링	07.12.20 ~08.2.7	기술 용역	07.12.17	경쟁 입찰	지방계약법 제9조 동법시행령 제16조	하수도정비공사 발주 및 준공	“

(단위 : 백만원)

❏ 2008년도

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역 기간	용역 종류	계약일자	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
표선면지구 농촌지역 수도시설 확장사업 기본및실시설계용역	53	기본및실시설계(관로 5.7Km, 배수지 신설 4개소) 1식	(주)한일엔지니어링 고태종	08.3.27 ~7.26	기술 용역	‘08.3.27	제한경쟁	지방계약법 시행령 제20조	농어촌지역의 균형 발전을 위하여 광역상수도 공급 기반 확충에 활용(완료)	상수도 관리부
농어촌 마을하수도 정비사업 실시설계용역	23	마을하수도 1개소 신설 및 2개소 개량	(주)상아엔지니어링 외1	‘08.2.14 ~.3 24	기술 용역	‘08.2.14	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	농어촌 마을하수도 정비공사 발주 자료 활용	하수도 관리부
제주시 읍면지역 소규모 하수(간이 오수)처리시설 유지관리용역	107	소규모 하수 (간이오수)처리시설 관리 27개소	제주환경 개발(주)	‘08.3.24 ~’09.3.24	기술 용역	‘07.3.24	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	관리 업무용역 추진중	“
서귀포시 (동지역) 하수관거 정비사업 실시설계용역	113	기본 및 실시설계 L= 68.1Km	㈜한일엔지니어링	‘08.7.2~'08.10.30	기술 용역	‘08.6.30	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	공사발주 자료 활용	“
서귀포시 (읍면지역) 하수관거정비사업 전면책임감리용역	1,548	하수관거정비 L= 70.4Km 폐기물처리용역 등 기타공사1식	(주)건화 외1	‘08. 7. 25 ~’11.4.24	기술 용역	‘08.7.25	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	감리용역 수행중	“
‘08 제주시 하수관거정비 임대형민자사업 처리시설기본계획 및 사전환경성검토, 타당성 및 민자 적정성조사 용역	874	‘08 제주시 BTL 처리시설기본계획 및 사전환경성검토 타당성 및 민자적정성 조사	(주)도화종합기술공사 외1	‘08.8.4 ~’08.12.2	기술 용역	‘08.8.4	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	용역 수행중	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 전면책임감리용역	1,505	제주시 5개읍면하수관거정비L=54.61㎞	(주)삼안 외2	‘08.10.1 ~‘11.10.1	기술 용역	‘08.9.30	경쟁 입찰	지방계약법 시행령 16조	감리업무 수행중	“

(단위 : 백만원)

용 역 명	용역 금액	용역내용	용역기관	용역 기간	용역 종류	계약 일자	계약 방법	계약근거	용역결과 활용상황(계획)	비고
제주도(Ⅱ) 광역상수도사업 시설공사 전면책임감리용역(7차분)	124	제주도(Ⅱ)광역상수도사업 시설공사 전면책임감리용역	㈜유신코퍼레이션 외1	‘08.2.27 ∼12.31	기술 용역	08.2.27	일반 경쟁	지방계약법 시행령 제12조	건설기술관리법에 의한 책임감리 시행 공사품질 확보	수자원개발부
제주시지역 지하수관정사후관리(도지사관리민간 위탁용역)	42	도지사에 의한 사후관리 관정점검 500공	(주)청화산업개발	‘08.5.20 ~7.28	일반 용역	08.5.19	견적입찰	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
광역상수도 관로연계사업 실시설계용역	165	배수지시설3개소 관로연계 12.5㎞ 지형현황측량 (배수지부지, 관로) 토질조사 보상물조사	(주)제이피엠엔지니어링	‘08.6.12 ~12.8	기술용역	08.6.12	제한경쟁	지방계약법 시행령 제 16조	예래,중문지구 공사발주(08.8월) 성산신양지구 애월상가지구 구좌한동지구 남원신례지구 공사발주에 활용	“
서귀포지역 지하수관정사후관리(도지사관리민간위탁 용역)	50	도지사에 의한 사후관리 관정점검 635공	남천개발	‘08.8.19 ~10.27	일반 용역	08.8.19	견적입찰	지방계약법시행령 제20조제1항제6호,제25조제5호	지하수개발 ․이용시설의 적정관리 및 지하수의 수질보전	“
어승생제2저수지건설사업기본및실시설계용역	1,549	저수지설 50만톤 정수시설 1만톤 도수관로 5.89㎞ 송수관로 5.97㎞	(주)이산엔지니어링	‘08.5.13 ~’09.5.7	기술용역	‘08.5.8	제한 경쟁	지방계약법 시행령 제20조	어승생 제2저수지 공사발주에 활용	“
제주시 상수도 누수탐사 및 관망도 전산화 구축사업	522	누수탐사 : 300km 관망도전산화 (CAD) : 178km	(주)한국빅텍, 세한기술공사(주)	08.5.6 ~09.1.10	기술용역	08.5.1	지명경쟁	지방계약법 제9조 동법시행령 제22조	(용역진행중) 누수로 인한 출수 불량민원 조기해결 및 효휼적인 상수도 관로 관리로 유수율 향상	제주지역사업소
아라동 대원마을외 시일원 하수도 정비공사 실시 설계용역	26	하수도 정비 L=1.24km	(주)지에스엔지니어링	08.8.20 ～08.10.10	기술 용역	08.8.20	경쟁 입찰	지방계약법 제9조 동법시행령 제16조	하수도정비공사 발주에 활용	“
서귀포시 블록시스템구축및누수 탐사사업	602	블록시스템구축 11개 블록 누수탐사 14개 블록 (L=281.5km)	(주)한국빅텍 (주)제이피엠엔지니어링	08. 6.27 ~09.11.26	기술용역	‘08.6.27	공개경쟁	지방계약법 시행령 제18조	유수율 제고 상수도관 유지관리	서귀포지역사업소

9. 감사원, 감사위원회 감사, 도의회 행정사무감사 지적사항 및 처리결과

❏ 2006 감사위원회 종합감사(제주시)

제 목	처분요구 내용	지적사항	처리결과
김녕하수관거정비공사(4차)외 1건에 대한 기계, 인력조합적용에 관한사항	시정	o 예산절감을 위하여 현장실정에 알맞게 터파기 및 석분부설 품을 기계,인력을 조합하여 시공될 수 있도록 설계변경 시행하여 82,741천원 상당의 예산을 절감할 수 있도록 감액 조치하여 주시고 o 앞으로, 예정가격의 기초가 되는 설계서를 작성하거나 용역납품서를 검토할 때는 과다 설계가 되지 않도록 관련법규 등을 충분히 숙지하여 검토하되 현장여건을 감안한 합리적인 설계가 되도록 하여 주시기 바랍니다.	o 옹포 관거정비공사 - 제주시 하수과-4296(‘06.12.21)호로 설계변경하여 기계, 인력조합 적용(8:2) 조정 o 김녕 하수관거정비공사 - 제주시 하수과-4935(‘07.7.19)호로 설계변경하여 기계, 인력조합 적용(8:2) 조정

❏ 2007 감사위원회 종합감사(수자원본부)

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
민간인 국외여비등 예산편성에 관한 사항	주의	지방공기업 예산편성기준 및 지방자치단체 세입세출 예산과목 설정 규정 등 관계규정에 적합하게 예산을 편성하기 바람.	2008년 예산편성 시에는 지방공기업 예산편성기준 및 지방자치단체 세입세출예산과목 설정 규정 등 관계규정에 적합하게 예산 편성
결산감사 용역 계약에 관한 사항	주의	용역계약을 체결할 때에는 계약의 성질,조건 등을 사전에 검토하여 예산이 낭비되는 사례가없도록 하기 바람.	용역계약 체결시 인쇄비용 원가산정에 철저를 기하도록 관련공무원에 대하여 연찬을 실시하고 예산을 낭비하는 사례가 없도록 조치완료
수의계약 사항 공개업무 소홀	시정	1천만원 이상의 수의계약을 체결함에 있어 공개하지 않은 수의계약 내역을 즉시 공개하기 바람.	1천만원 이상의 수의계약 체결사항을 제주특별자치도 홈페이지 수의계약 공개방에 전부 공개

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
공유재산관리 소홀	시정	미등기 건물 및 시설물의 권리보전에 필요한 조치계획을 조속히 수립하여 등기절차를 이행하기 바람	통합상수도 공유재산권리보전을 위한 소유권보존 조치계획을 수립하여 등기완료(‘08.9.13)
상수도 노후관 교체공사에 관한 사항	시정	○토공의 추정암 설계시 시공중 실측하여 실제에 맞게 설계변경하고 ○포장절단(컷터) 미시공 부분에 대한 2,230천원 회수조치 ○남원읍 위미리 맹치동산 배수지 시설공사 설계변경 미시행 부분에 대한 공사비 2,107천원 회수조치하기 바람	○토공의 추정암 설계후 시공시 실제 검측한 결과대로 설계변경 시행 ○포장절단 미시공 부분에 대한 2,230천원 회수조치 완료 ○남원읍 위미리 설계변경 미시행부분 2,107천원 회수조치 완료
상수도 관로 공사에 관한 사항	시정	상수도공사의 관로터파기와 관련하여 환경부제정 상수도표준시방서 및 상수도 시설기준 등에 의거 우리지역에 맞는 관로 굴착 단면을 조속히 마련하여 부적정한 설계로 인하여 시설물에 하자가 발생하거나 공사비 과다로 예산을 낭비하는 사례가 없도록 하기바람	상수도공사시 수자원본부 관로굴착 표준단면 마련 시행함
상수도 체납액 결손처분 관련	주의	상수도 요금 체납자 재산압류등 채권확보 방안 강구	상수도 사용료 체납액 징수계획을 수립, 1년에 3회이상 체납자에 대하여는 지방세 체납처분의 예에 따라서 건축물대장, 등기부 등본 조회등 재산추적을 통하여 고질체납자 재산압류등 채권확보 조치를 강화해 운영하고 있음

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
시설물 정기안전 점검에 관한 사항	시정	가. 시설물 정기안전점검 용역비 집행관련 - 시설물의 종합점검은 건설안전분야 교육과정을 이수한 공무원이 가능함에도 용역시행으로 예산을 비효율적으로 집행 - 앞으로 소속 공무원이 자체 점검하여 불필요한 용역 지양	구 제주시의 경우 상기 교육 이수자가 없어 부득이 안전전문기관 용역의뢰 하였으나 향후 시설물의 종합점검은 건설안전분야 교육 과정을 이수한 공무원(1명)으로 하여금 종합점검을 실시해 나가고 있음
		나. 시설물 정기안전점검결과 지적사항 보수․보강 미이행 - 시설물 종합안전점검결과 지적사항은 조속한 시일내에 보수․보강이 이루어지도록 조치 바람.	월산정수장외 11개소 시설물 종합안전점검 결과 용담수원지 옹벽균열등 6개항목, 삼양3수원지 변전실 서측 벽체 수직균열 17개 항목에 대해 보수․보강공사를 일괄 발주․준공함
어승생수원 정수처리시설 설치공사 관련	시정	가. 성토재 수량산출관련 토량환산계수 잘못적용	앞으로 내역산정에 철저를 기하여 적정 한 설계가 되도록 하겠음
		나. 공사원가계산서의 경비 산정관련 관계규정 미숙지	관계규정을 철저히 숙지하여 과다 계상되는 사례가 없도록 하겠음
		다. 도․송수관로 설계시 시방서 및 시설기준에 의해 지역여건에 맞도록 설계	상수도표준시방서 및 상수도시설기준에 적합하게 설계토록 하겠음
		라. 방수작업관련 - 완속여과지 3지중 (25m× 40m)1지 내부바닥 에폭시방수 재시공	에폭시방수를 표준시방서와 제품시방서 기준에 맞게 재시공 완료하였음
상수도 이용시설의 관리․운영계획 및 미사용 상수도시설 관련	시정	- 주요 시설물에 대한 관리․운영계획을 수립 운영 - 미사용 상수도시설은 적합한 처리계획을 검토하여 조치하기 바람.	시설물에 대한 관리․운영계획을 수립하였으며, 미 사용시설은 철거 추진 완료함

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
수질검사실 운영관련	시정	수질검사를 함에 있어 시료채취 기록부를 작성, 투명성을 확보할 수 있도록 조치	수질검사에 따른 시료채취기록부 및 시험기록부를 작성․비치함
		검사요원이 최적의 조건에서 적정 처리 할 수 있도록 검사업무 과중시 보건환경 연구원과의 검사업무 분담협의 등의 대책 마련	상수도에 대한 수질검사는 수자원 본부가 현행대로 추진토록 하고 민원수질검사에 대하여는 보건환경연구원과 업무분담 조치함
		공정한 검사업무를 수행을 위하여 정수장 관리부서와 독립하여 검사실 직제에 대하여 검토 바람	검사실 직제에 대해서는 관계부서와 지속적으로 검토․보완해 나가겠음
정수장 배치인력 관련	시정	정수장의 효율적 운영관리를 위해서 청경 등 일용직에 대해 교육기회를 제공 ․신규로 배치되는 근무인력에 대해서는 사전에 건강진단을 받도록 조치 바람.	취․정수장 근무자 직무능력 향상 및 건강진단 실시 개선계획 수립함
정수장 수질관리 등 운영관리 소홀	시정	정수장에서의 1일 수질검사 항목에 대한 검사를 공정시험법에 의하여 철저히 하기 바라며, 색도계가 비치되지 않은 정수장에 대해서는 조속히 구입 조치하기 바람.	정수장 일일수질검사 대장 작성 비치하였으며, 일일 수질검사방업을 교육 철저를 기하도록 하고 있으며, 색도계 구입 및 배부하였음
		정수장에 약품수불부를 비치하고 약품 보관 장소를 확보	소독약품 수불부 작성 및 비치 야외방치 소독약품은 정수장 창고내에 보관하고,향후 보관창고 신축을 안전하게 별도 보관 조치하였음
정수장 수질관리 등 운영관리 소홀	시정	연속측정 탁도계가 설치되어 있지 않은 정수장에 대해서 조속히 탁도계 설치하고, 자동기록장치가 설치되지 않은 정수장에 대해서는 조속히 시스템을 구축	탁도계 및 연속측정장치 설치 완료하였음

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
통합 후 불용된 수질검사장비 관리 소홀	시정	사용하지 않는 수질검사 장비에 대하여 재점검 하고 점검결과에 활용계획을 수립하여 효율적으로 관리되도록 하기 바람.	수질장비 불용품 활용계획 수립하였으며, 불용품 처리 및 소요물품 관리 전환 처리하였음
광역상수도사업 시설공사(정수지)에 관한 사항	시정	광역상수도(Ⅱ)정수시설 공사시재료변경이 있었으나 설계변경 등 감액조정없이 지출한 공사비 18,737천원 회수조치하기 바람.	회수조치 완료
표선지구 광역 상수관로 연계 공사에 관한사항	시정	광역상수관로 터파기 공사시 설계변경 사유가 발생했으나 감액조정 없이 지출한 공사비 3,998천원을 회수조치 하기 바람.	회수조치 완료
건설근로자 퇴직 공제비 정산에 관한사항	시정	퇴직공제부금비에 대하여 직접공사비의 합계액에 퇴직공제비율을 곱하여 산정 계약하지 아니하고 제경비를 포함한 금액으로 설계, 감액조치하기 바람.	감액조치 완료
제주도(Ⅱ)광역상수도 시설공사에 관한사항	시정	관저면의 암반인 경우에도『상수도 표준시방서』에서 정하고 있는 기준(20cm)보다 상이하게 30cm로 추가굴착 및 석분으로 치환하는 것으로 설계, 공사비 7,645천원 상당을 감액처리하기 바람.	감액조치 완료

제 목	처분요구 내 용	지적사항	처리결과
지하수개발․ 이용허가(기간연장) 부적정	주의	지하수개발․이용변경(기간연장)허가시 수질검사 결과 적합판정을 받은 시설물에 대하여 허가를 하고 있으나, 부적합 판정을 받은 시설물 4건은 재검사, 정수처리시설의 설치 요구 등의 조치 없이 허가	○ 수정식품 - 지하수 이용은 공장내 청소용수로만 사용하고 있어 보건위생상 지장이 없는 용도로 이용하는 생활용수의 경우는 수질검사 대상에서 제외 되므로 생활용(비음용) 청소용으로 용도변경 허가 ○ 밀레니엄호텔 - 수질검사 결과 적합 ○ 서귀포시 서귀동 803번지 관정 - 수질검사 결과 적합 ○ 고정자 소유 지하수 - 이용 종료 처리
농업용수종합계획 미 수립 및 대체 수자원 개발관련	시정	○2004.2월 농업용수 종합계획 수립을 위한 용역 완료후 현재까지 종합계획 미수립 ○광령, 귀엄, 용수저수지는 농업용수로 이용될 수 있는 송수관, 배수관등 시설물이 전혀 시설되어 있지 않는 등 활용계획 미수립	○수자원관리종합계획 및 농업용수종합계획 계획등을 통합한 “Jeju Water Vision 수립계획에 포함 2009년도에 계획 수립 ○저수지(광령,귀엄,용수)를 관리하고 있는 농촌공사 제주지역본부에 농업용수로 활용될 수 있도록 계획수립 요청 조치 완료
빗물이용시설 보조 사업자 선정 관련	시정	빗물이용시설 보조사업 계획 공지 없이 우선 신청자에게 보조 지원함으로서 특혜 제공 우려(03년 이후 49건 / 129,290천원)	○2008년 예산에 빗물이용시설 설치지원 사업비 계상 ○지원사업 홍보(‘07.10) 및 사업계획수립(’08.1)시 대상자 선정 기준을 정하여 추진 ○‘09년 지원사업비 500백만원 확보 및 홍보 등을 통하여 사업자 선정 후 지원사업 시행
주민복지시설 지하수 원수 부과징수 관련	시정	광역 소각 시설의 주민복지시설에 대하여 지하수 원수대금 부과 취소 및 환급 조치하기 바람	○지하수 원수대금 감면 및 환급조치 완료함

제    목

처분요구

내   용

지적사항

처리결과

상수도요금 현실화

관련

권고

상수도통합 전․후 상수도요금에 대한 평가분석을 실시하여 합리적인 공기업 경영과 광역상수도 사업의 효율적 추진을 위하여 정수장 및 가압장 시설 근무인력에 대한 인력조정 및 산재되어 있는 지하수 시설의 원격 감시제어를 위한 무인화 시스템 구축 등 시설 현대화 추진으로 시설물의 효율적 관리와 상수도 원가절감 등 경영합리화를 위한 대책을 마련하기 바람

《현   황》

구 분	급수수익 (백만원)	공급단가 (원)	현실화율 (%)
통합시점	35,771	692	81.0
2007결산	31,855	597	62.2

《추진실적》

○상수도통합에 따른 경영합리화를 통한 생산원가절감

※‘07년 결산결과 손실액이 통합 1년차 131억, 통합 2년차 55억으로 76억이 줄어들어 통합에 따른 가시적 성과 창출

☞ ‘07실적 : 76억원 생산원가절감

∙유휴시설정비(37개소) : 12억원

∙무인화 및 시설현대화(2개소, 인력ꋱ6명) : 3억원

∙수선비 등 경상경비 절감 : 26억원

∙세입증가 : 35억원(수질개선교부금, 부담금등)

☞ ‘08계획 : 55억원 생산원가절감

∙유휴시설정비(28개소)․33억원

∙무인화 및 시설현대화(6개소, 인력ꋱ18명) : 7억원

∙수선비 등 경상경비 절감 : 4억원

∙세입증대(상수도사용료) : 11억원

《향후계획》

○광역상수도 공급체계 전환에 따른 유휴시설 정비 및 시설현대화 등 경영합리화를 통한 자구노력으로 적자폭(55억) 자체 흡수

○물가상승분에 대하여는 단계적로 요금현실화 추진

※ 통합상수도 경영합리화 감사위원회 권고, 계획수립(2007. 7. 30 도지사보고)

❏ 2007년도 감사위원회 종합감사(도, 서귀포시)

제 목	처분요구 내용	지적사항	처리결과
하수관거 정비사업 분리발주에 관한사항	주의	ㆍ공사량을 분할하여 발주, 계약 하는 사례가 없도록 조치	ㆍ공사량을 분할발주 및 계약하는 사례가 없도록 조치 (완결)
가설건축물 시공에 관한 사항	시정	ㆍ현장사무실을 현장여건에 맞게 감액 조치 (대정1.2공구, 안덕2공구)	ㆍ설계변경시 반영 (2007. 12. 14) ⇒ 20,834천원 감액조치 (완결)
하수관거 정비사업 및 하수도 시설관련	시정	ㆍ폐기물 운반거리를 실지에 맞게 조정(회수지구, 강정지구하수관거 정비사업) ㆍ기계화시공 및 추정암수량에 대하여 회수조치(감귤랜드주변 하수도 시설공사)	ㆍ과다설계된 4건 11,026천원에 대하여 회수조치 (2007. 7. 30) (완결)
동부(보목)하수처리장 고도처리시설 공사관련	시정	ㆍ계장제어장치 시운전기간을 실투입일에 맞춰 회수 ㆍ전선관 미시공분에 대하여 회수 조치	ㆍ고도처리시설(계장제어장치) 및 고도처리시설 전기공사 설계변경 하여 감액 조치 (2007.06.15) (완결)
감리용역 사업수행능력평가 기준에 관한 사항	주의	ㆍ사업수행능력 평가시 자체평가 위원회를 구성하여 평가의 투명성과 공정성을 확보하기 위함 (동부하수종말처리장 감리용역)	ㆍ향후 유사한 사례가 발생 하지 않도록 하고 자체 평가위원회를 구성하여 평가 실시 (완결)
천서동 하수관거 정비공사 폐기물 처리용역 설계 부적정	시정	ㆍ원가계산시 폐기물 수수료가 재료비, 노무비, 경비로 계상되어 감액조치(천서동, 상예지구)	ㆍ설계변경하여 감액조치 - 천서동 하수관거정비공사 폐기물처리용역 (‘07.6.12) - 상예지구 하수관거 정비공사 폐기물처리용역 (‘07.8.3) (완결)
마을회관 신축사업 보조금 교부 업무처리 부적정	주의	ㆍ보조금의 투명성과 적정한 집행을 기하기 위하여 보조금 관리규정에 의한 행정절차등을 철저히 하고 보조사업에 대한 감독 및 정산검사를 이행하기 바라며 관련공무원에 대하여는 엄중한 주의를 촉구하기 바람	ㆍ보조금관리규정에 의한 행정절차등을 보완조치하였으며 보조사업에 대한 감독 및 정산검사 완료 하였음 (완결)

제 목	처분요구 내용	지적사항	처리결과
하수도 사용료 체납액 납부지도․감독 소홀	주의	ㆍ각 행정시에 체납액에 대한 원인파악 및 징수를 위한 특단의 조치 등을 강구토록 지시 및 관리 ㆍ관련공무원에 대하여는 직무연찬을 통하여 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 각별 유념	ㆍ하수도 사용료 체납액에 대하여 원인파악 및 징수를 위하여 8.27일 각 행정시별 체납액에 대한 원인파악 및 징수대책을 수립토록 조치 ㆍ행정시에서는 체납액 징수를 위하여 동별 체납 징수 담당공무원을 임명하여 현지방문을 통한 납부독려 및 체납자에 대한 재산압류 조치(3건 등) (완결)
하수처리장 방류수재이용 사업에 관한 사항	권고	ㆍ광역하수도 정비기본계획 수립시 방류수 재이용 사업계획 반영 및 사업추진 시 타당성 등 면밀히 분석 검토 추진 - 수질분석 후 재이용가능여부 판단 - 해수등의 하수관거 유입차단 방안 검토 - 염소이온농도가 농업용수 수질기준 초과하여 유입된 하수에 대한 농업용수로 재처리시 비용-효과 분석검토	ㆍ2008년도 국고보조사업으로 월정, 판포, 태흥처리장 방류수 재이용 사업의 사업계획을 환경부에 제출(2007.4)하여 판포하수처리장 방류수 재이용 사업이 ‘08년도 신규사업으로 반영 - 방류수 재이용 사업 추진시 농업용수 등으로 재이용시의 염분유입에 따른 대책을 수립하여 사업추진시 반영 (완결)
제주시위생처리장 사용료 징수업무 소홀	시정	ㆍ제주위생처리장 사용료를 납부하지 않고 있는 업소에 대해 전액 추징(120,496천원)조치 및 사용료 납입방법 개선 ㆍ사용료 미납 분뇨수거업자에 대해 재산압류 등 채권확보 방안 강구 ㆍ관련공무원에 대한 직무연찬 및 엄중 주의촉구	ㆍ제주시위생처리장 관리자(경원산업)로 부터 매일 업소별 처리실적 보고받은 후 세외수입프로그램 이용하여 부과․징수 담당자가 익일 부과 → 부과․징수 전산화 ㆍ위생처리장 사용료 징수업무 교육실시 - 2007. 3. 5(월) 10:00 - 교육참석자 : 제주하수시설담당, 위생처리장 업무담당자 ㆍ위생처리장 사용료 추징 - 납부되지 않은 위생처리장 사용료 파악후 세외수입프로그램 이용하여 부과 → 부과․징수 전산화(‘06.10.26) ㆍ체납액에 대한 조치사항 - 총부과액 : 123,648,900원 - 납부액 : 123,648,900원(2007.11.02완납) (완결)

❏ 2006 도의회 행정사무감사

시정 및 처리요구사항	처리결과
상수도 통합이후 상수도 적자가 발생하여 상수도 요금인상 요인으로 작용하고 있으므로 적자폭을 최소화 할 수 있는 방안을 강구하기 바람	∙상수도통합에 따른 경영합리화를 통한 생산원가절감 ※‘07년 결산결과 손실액이 통합 1년차 131억, 통합 2년차 55억으로 76억이 줄어들어 통합에 따른 가시적 성과 창출 ☞ ‘07실적 : 76억원 생산원가절감 - 유휴시설정비(37개소) : 12억원 - 무인화 및 시설현대화(2개소, 인력ꋱ6명) : 3억원 - 수선비 등 경상경비 절감 : 26억원 - 세입증대 : 35억원(수질개선교부금, 부담금등) ☞ ‘08계획 : 55억원 생산원가절감 - 유휴시설정비(28개소)․33억원 - 무인화 및 시설현대화(6개소, 인력ꋱ18명) : 7억원 - 수선비 등 경상경비 절감 : 4억원 - 세입증대(상수도사용료) : 11억원 ∙향후계획 - 광역상수도 공급체계 전환에 따른 유휴시설 정비 및 시설현대화 등 경영합리화를 통한 자구노력으로 적자폭(55억) 자체 흡수 - 물가상승분에 대하여는 단계적로 요금현실화 추진
빗물이용시설에 대한 점검을 강화하고, 빗물이용시설 미 사용시 제제를 강화할 수 있는 방안을 강구하기 바람	∙매년 빗물이용시설에 대한 점검 실시 후 미비점 행정지도 강화 ∙의무적 빗물이용시설 미설치시 2천만원 이하 과태료 부과 및 사용기준 미달시 부족수량에 대한 원수대금 5배의 가산금 징수
농업용 지하수 사용량을 저감하기 위하여 중산간 지대에 대규모의 농업용 저수지를 설치할 수 있는 대책을 검토하기 바람	∙성읍지구(‘03~’13) : 125만톤․482억원 ∙옹포지구(‘06~’16) : 63.6만톤․400억원 ∙함덕․송당지구, 서림지구 등 신규착수 추진
지하수 원수대금 체납자에 대한 이용중지 처분을 확행하고 체납자에 실질적인 제제가 될 수 있도록 제도적인 문제점을 보완하기 바람	∙지하수관리기본조례 제65조에 의거 원수대금 3회이상 체납시 이용중지 명령 ∙지방세법 제28조에 의거 재산압류 등 체납처분 ∙지하수관리기본조례 제59조제5항에 의거 납기일까지 완납하지 아니할 때에는 가산금 부과

시정 및 처리요구사항	처리결과
지하수오염에 의한 식중독 발생, 수질검사 실적 저조 등 지하수의 수질관리에 소홀한 점이 있으므로 지하수 수질관리 대책 및 부서별로 개별적으로 추진되고 있는 수질분석 결과를 통합관리 할 수 있는 방안을 강구하기 바람	∙수도법 등 관련 수질검사기준에 의거 수질검사 확행 및 검사 강화 - 세계적 수준의 먹는물 수질검사기준 강화 : 검사항목:60항목(‘08)→66항목(’09)→96항목(‘12) ∙지하수 사후관리제도 도입(‘06.7.1)에 따른 수질관리 확행 - 관리대상 : 4,829공 [시설자관리:1,405공(상수도용 및 공공농업용 등)] [도지사관리 : 3,424공(양수능력 500톤/일 이하)] - 사후관리 지하수 수질검사(8개항목), 분기별 1회 이상 ∙수질검사(분석)결과 상하수도본부 및 환경자원연구원, 관련부서 등 유기적 협조체계 구축 - 수질검사결과 부적합사항 관련부서 즉시 통보 - 수질 부적합의 경우 원인분석후 수질개선 및 용도전환, 폐공 등 사후 조치
읍․면 지역주민들이 불편을 해소하기 위하여 읍․면의 상수도 업무를 처리할 수 있는 부서신설 등의 방안을 강구하기 바람	∙상수도 민원업무 담당직원 읍․면 재배치 (’06. 12. 22) - 70명 - 제주시 : 35명 (기능 7, 일용 28) - 서귀포시 : 35명 (기능6, 일용 29) ∙ 사무위임 조례 개정 - 상수도 민원사무의 읍․면 위임 주민불편 해소 (급수공사 승인 및 공사시행, 가구분할, 용도변경, 검침 및 요금부과, 계량기 시험, 급․배수관로 고장수리 등 주민의 생활과 밀접한 기초사무) ∙읍․면 상수도 담당부서 지정 - 건설담당부서에 사무분장 ※ 정원동결 방침에 따라 상수도 전담부서 미설치
미 사용중인 지하수공의 현황을 파악하여 폐쇄를 유도할 수 있는 방안을 강구하기 바람	∙폐공 자진신고기간 연중운영 및 지하수 연장허가, 지하수자원특별관리구역 조사 등을 통하여 폐공 대상관정을 지속적으로 발굴하여 원상복구 추진(‘03~’08년까지 214공․691백만원)

❏ 2007 도의회 행정사무감사

- 업무보고서 “2007 행정사무감사시 지적사항 시정조치결과 “ 참조

10. 2008 회계연도 예산의 이용․전용사항

- 해 당 없 음

11. 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

계속비이월

1) 제주도(Ⅱ)광역상수도사업시설공사(정수장 시설공사)

□ 사업개요

○ 시설규모 : 정수시설 4개소(88천㎥/일) - 장전, 금악, 서광, 회수

○ 총사업비 : 20,790백만원(지방비)

○ 사업기간 : 2004년 ～ 2008년

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	‘07년집행액	이월액	비고
일반회계	계	7,997	6,629	1,368	수자원 개발부
	시설비	7,776	6,408	1,368
	감리비	200	200	0
	부대비	21	21	0

□ 이월사유

○ 본공사는 ‘04. 10. 19일 착공 ’08. 12월 준공 계획인 장기계속공사로서 공사기간이 상당기간 소요됨에 따라 공기에 맞추어 이월

□ 공사추진 및 마무리계획

○ 정수장 4개소 구조물 및 건축 및 토목공사 완료

○ 감시정(7공) 굴착 중(진도 97%)

○ 2008. 12월까지 공사완료 계획임.

2) 제주시 동지역 하수관거 정비공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 이도2동(도남동), 삼도1동, 용담1동, 오라동 일원

○ 사 업 량 : 하수관거 L=47.1㎞, 배수설비 4,301개소

○ 총사업비 : 48,000백만원(국비 24,000   지방비 24,000)

○ 사업기간 : 2007. 8 ～ 2010. 8

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	계	16,000	5,222	10,738	하수도 관리부
	시설비	15,100	4,811	10,289
	감리비	900	411	449

□ 이월사유

○ 제주시 동지역 하수관거 정비공사는 제주시 일원(5개동) 분류식 하수관거 정비 사업으로서 공사기간이 2007. 8월 ~ 2010. 8월까지 36개월간 시행하는 장기 계속비공사임.

□ 공사 추진상황 및 마무리계획

○ 2007. 8. 24 : 공사 착공

○ 2008. 10월말 현재 하수관거 L=27.5㎞, 배수설비 2,147개소 완료

※ 전체공정율 : 49%

○ 2010. 8월까지 공사완료 계획임.

3) 하수슬러지 처리시설사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 제주시 도두2동 24-4번지(제주하수처리장내)

○ 처리방법 : 매립장 복토재 활용

○ 시설규모 : 70톤/일

○ 사업기간 : 2005. 3 ～ 2010. 6

○ 총사업비 : 11,700백만원(국비 6,774   지방비 4,926)

- ‘08년 사업비 : 2,285백만원(국비 1,600, 지방비 685)

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	계	1,225	1,225	-	하수도 관리부
	시설비	1,225	1,225	-

□ 이월사유

○ 본 하수슬러지 처리시설사업은 도내 8개 하수처리장에서 발생하는 슬러지를 처리하는 광역 사업으로써 사업기간이 2005. 3월 ~ 2010. 6월까지 시행하는 장기 계속비 사업임.

□ 공사 추진상황 및 마무리계획

○ ‘05.  3.    : 환경관리공단 업무 위․수탁 협약 체결

○ ‘07.  7. 13 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

○ ‘07.  8. 13 : 설계․시공 입찰공고(턴키)

○ ‘07. 12. 18 : 사업자 선정(효성에바라엔지니어링, 유성건설)

○ ‘08.  6. 27 : 도시관리계획 변경 결정

○ ‘08.  8. 28 : 공공하수도 설치인가 및 고시

○ ‘08. 10. 30 : 공사 착공

○ ‘10.  6. 30 : 공사 준공 예정

4) 제주하수처리장 고도처리시설 사업

□ 사업개요

○ 사업규모 : 고도처리시설(Q=130,000㎥/일) 및 노후시설 개량 1식

○ 총사업비 : 43,341백만원 (국비 21,671, 지방비21,670)

※ 총사업비 변경 : 40,626백만원 → 43,341백만원

○ 사업기간 : 2004년 ～ 2009년

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 공기업 특별회계	계	8,610	8,610	-	하수도 관리부
	시설비	8,610	8,610	-

□ 공사추진 및 마무리계획

○ ‘04. 08. 02 환경관리공단과 사업수행 위․수탁 협약 체결

○ ‘04. 11. 26 ～ 05. 3. 25 기본계획 및 입찰안내서 작성용역

○ ‘05. 04. 19 지방재정․ 투 융자사업 (중앙심의)

○ ‘05. 09. 25 고도처리시설 설치 인가

○ ‘05. 11. 14 고도처리시설 설치공사 입찰 공고(설계․시공 일괄)

○ ‘06. 09. 12 재원협의

○ ‘06. 11. 21 공사 착공

○ ‘09. 05. 20 공사 준공예정

※ 공정율 82%(10월 말 현재)

명시이월

1) 강정정수장 송배수관 이설공사

□ 사업개요

□ 사업개요 : 주철관부설 L=372m (D500mm),

주철관부설 L=372m (D700mm),

□ 총사업비 : 274백만원

□ 사업기간 : ‘08. 8. 27 ～ ’08. 11. 25

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
상수도사업특별회계	자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비	246	-	246	상수도 관리부

□ 이월사유

□ 본 사업은 ‘06년 2월 제주도 프로축구단(제주 유나이티드)유치를 위한 체육시설(축구장) 조성제공 협약에 의거 축구장 조성사업시설 부지내에 송ㆍ배수관 이설공사를 2007년도에 추진중 제주유나이티드 FC 축구장 조성부지내에 문화재 지표조사, 시굴조사 등이 지연으로 건설개량 이월이 불가피

□ 공사추진 및 마무리계획

□ 공사발주 : 2008. 8. 13

□ 공사착공 : 2008. 8. 27

□ 준공예정 : 2008. 11. 25

□ 현재 정상적으로 공사추진(공정율 85%) 되고 있어 ‘08년 11월 사업완료 예정

2) 제주국제자유도시기반시설 용수공급

□ 사업개요

□ 공 사 명 : 국제자유도시기반시설사업(토목․건축 2건, 전기 4건, 기계 2건)

□ 사업기간 : 2007. 6. ～ 2008. 6.

□ 사 업 비 : 2,690백만원(국비 100%)

□ 사업내용 : 산천단배수지 시설공사외 9건(시설7건, 감리용역2건)

- 산천단배수지시설(1건․1,260백만원) : 배수지 3,000톤/1지, 송배수관 D=300mm L=474m

- 아라가압장 시설 (9건․1,430백만원)

․가압시설(1건) : 가압시설(기계,전기실) 1식, 관리사무실(54.78㎡) 1동

․전기시설(5건) : 수배전반시설 1식, 계장 및 자동제어시설 1식

․기계시설(1건) : 가압모터펌프 시설 1식

․감리용역(2건) : 전기 및 건축감리용역

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
상수도사업특별회계	자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비	134	-	134	상수도 관리부

□ 이월사유

□ 제주국제자유도시 기반시설 용수공급시설에 따른 JDC 추가부담금이 제2회 추경에 확정(‘07.12.21)됨으로 인해 절대공기가 부족하여

부득이 이월사업으로 추진

□ 공사추진 및 마무리계획

□ 2008.  6월 : 사업완료

3) 태풍“나리”피해복구 공사(시설비)

□ 사업개요

□ 개    요 : ‘07. 9. 13~9. 18 기간중 제11호 태풍 ’나리‘로 인한 피해가

발생한 상수도 시설에 대한 피해복구사업

□ 총사업비 : 5,838백만원

□ 사업기간 : ‘07. 12 ～ ’08. 11

□ 이월액                                              (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
상수도사업특별회계	자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비 (감리비,시설부대비 포함)	2,685	-	2,685	상수도 관리부

□ 이월사유

□ 태풍“나리”피해복구비(‘07.10.22) 확정, 사전집행승인(’07.11.19), 제2회 추경(‘07.12.21)확정으로 절대공기가 부족하여 부득이 다음연도 이월

□ 공사추진 및 마무리계획

❍ 추진상황

- 사업장별 내역                                     (단위 : 백만원)

사업구분		총계		‘07완료		‘08이월 추진
		건수	금액	건수	금액	소 계		건설개량		사고이월
						건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계		75	5,838	10	122	65	5,716	6	2,685	59	3,031
본 부	소 계	48	4,730	10	122	38	4,608	5	2,658	33	1,950
	취정수장	47	2,700	10	105	37	2,595	4	645	33	1,950
	어 승 생	1	2,030	-	17	1	2,013	1	2,013	-	-
제주지역	취정수장	27	1,108	-	-	27	1,108	1	27	26	1,081

□ 완  료 : 75건․5,838백만원(이월기준)

-  2008.  10월 : 태풍 피해복구공사 전체 사업완료

- 취수원 도수로복구, 취수원 준설, 옹벽시설에 대해서는 우기전    (‘08. 6월) 완료하여 제2의 피해 사전 예방함

4) 추자식수원개발사업

□ 사업개요

□ 사업량

- 저류조 1지(500M/T), 도수로 117m

- 수중모터펌프(60마력×양정85m) 2대, 취수구 하상 정비 20m

□ 사 업 비 : 1,466백만원(국비 1,033, 도비 433)

□ 사업기간 : ‘07. 11. 9 ～ ’08. 7. 21

□ 이월액                                              (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액		‘07 집행액	이월액	비 고
상수도사업 특별회계	자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비	합 계	1,466	1,048	418	상수도관리부
		명시이월	116	-	116
		사고이월	1,350	1,048	302

□ 이월사유

□ 추자식수원 개발사업의 일환으로 추진하는 묵리 복류수 이용시설공사로서  지하수개발(2공) 및 이용시설은 기 완료하였으나 동 공사인 경우 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월

□ 공사추진 상황(준공완료)

□ 공사착공 : 2007. 11.  9.

□ 공사준공 : 2008.  7. 21.

5) 키멘스전자(어음2리) 하수도 시설사업

□ 추진경위

○ ‘07. 3. 28 수도권기업 제주 유치와 관련하여 관계부서 협의 회의시 기반       시설 지원키로 협의

□ 사업개요

○ 위    치 : 제주시 애월읍 어음리 1866번지외 7필지

- 기 업 명 : 키멘스전자(주) 대표 안명수

- 업    종 : 악기부품, 기타앰프 제조업

- 공장규모 : 공장, 창고, 사무실 등 9,910㎡

○ 사 업 량 : 합류식 하수관거 신설 L=1,000m(D=600m/m)

○ 총사업비 : 500백만원

○ 사업기간 : ‘08. 10 ~ ’09. 2

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
일반회계	시설비	500	-	500	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 2007년 4월 어음지구가 자연재해위험지구로 신규 지정되어 예산의 중복  투자 등을 고려하여 자연재해 위험지구 정비계획과 연계하여 추진하도록  검토요청(도 투자지원과 ‘07. 11. 20)이 있어 부득이 본 사업비를 이월함.

□ 공사 추진상황 및 마무리계획

○ ‘08.  5. 26 : 재해위험지구정비사업 변경 계획 제출(도→방재청)

○ ‘08.  9. 12 : 어음지구 설계용역비 승인(250백만원)

○ ‘08.  9. 26 : 관련부서 등 노선 협의(마을주민대표, 제주시, 상하수도본부)

○ ‘08. 10. 29 : 공사 발주

○ ‘09.  2. 20 : 준공 예정

6) 제주시 읍면지역 하수관거 정비사업 실시설계 용역

□ 사업개요

○ 사업위치 : 제주시 5개 읍․면 12개 소처리분구

○ 사 업 량 : 실시설계 1식 (하수관거 신설 및 교체 L=54.6㎞)

○ 사 업 비 : 870,000천원(지방비)

○ 용역기간 : 2007. 9. 11 ~ 2008. 9. 12

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
일반회계	시설비	870	247	623	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 본 용역은 ‘07년 1회 추경시 확보된 예산(’07. 5)으로 제주시 읍면지역 하수 관거정비사업(2008 ~ 2010)에 따른 실시설계 용역으로서 PQ심사, 입찰공고 등 제반행정절차 이행으로 ’07. 9월 용역이 계약․착수되었으나 절대과업기간 부족 등으로 부득이 이월함.

□ 용역추진 및 마무리계획

○ 용역 준공 : '08. 9. 12

○ 제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 착공 : '08. 9. 19

7) 제주시 마을하수도 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 제주시 읍․면 8개 지역(8개소)

- 유수암리, 송당리, 동복리, 선흘2리, 대흘2리, 월림리, 수산리, 우도천진리

○ 사 업 량 : 오수처리시설 개량 8개소, 하수관거 정비(D=250mm) L=1.2㎞

○ 사 업 비 : 1,200백만원(균특 840  지방비 360)

○ 사업기간 : 2007. 11. 8 ~ 2008. 6. 27 .

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
일반회계	시설비	1,200	562	638	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 본 사업은 농어촌마을하수도에 대한 개량 및 관거 정비사업(천진리외 7개소)으로 총 8개소(개량및관거정비)중 7개소는 ‘08.11.08 공사 발주하여   준공 조치(‘08.2.26)되었으나,

○ 1개소(우도 천진리)는 오수처리시설 개량 및 하수관거정비(L=0.75㎞)사업을 시행하는 사업으로서 총사업비가 5억이상 되어 제주특별자치도감사위원회 자치감사 규정에 의한 일상감사 등 제반행정절차 이행 및 절대공사기간(6개월) 부족으로 인하여 연내 사업완료가 불가하여 부득이 이월

□ 공사추진 및 마무리계획

○ ‘07. 12. 27 : 우도 천진리 농어촌 주거환경개선공사 착공

○ ‘08.  6. 27 : 우도 천진리 농어촌 주거환경개선공사 준공

8) 제주시 농어촌 주거환경개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 제주시 추자면 묵리(1개소)

○ 사 업 량 : 오수처리시설 1식(Q=100㎥/일), 하수관거(D=300m/m) L=0.42㎞

○ 사 업 비 : 830백만원(균특 581  지방비 249)

○ 사업기간 : 2007. 11. 13 ~ 2008. 7. 7

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
일반회계	계	830	717	113	하수도 관리부
	시설비	823	715	108
	부대비	7	2	5

□ 이월사유

○ 본 사업은 추자 묵리 농어촌 주거환경개선사업으로 추진한 오수처리시설 설치 사업으로, 실시설계 4개월 소요 및 마을하수도 설치 협의(도), 일상감사 등 행정절차 이행이 장기간 소요되어,

○ 2007. 11월에 착공함에 따라 절대공기 부족 및 국비반납을 최소화 하기 위하여 불가피하게 명시이월하여 사업을 추진함

□ 공사추진 및 마무리계획

○ ‘07. 11. 13 : 공사 착공

○ ‘08.  7.  7 : 공사 준공

9) 서귀포시 읍면지역 하수관거 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 서귀포시 대정읍, 성산읍, 안덕면 일원

○ 사 업 량 : 하수관거정비 L=86.4km

○ 총사업비 : 36,496백만원(국비 25,547 , 지방비 10,949)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
일반회계	시설비	14,368	14,306	62	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 장기계속사업으로 추진하는 서귀포시 읍면지역 하수관거 정비공사에 대하여 공구별 준공에 따른 물량정산으로 잔여사업비가 발생함에 따라 부득이  다음연도로 명시이월 조치

□ 공사추진 및 마무리계획

○ 신산리 하수관거 정비공사(명시이월사업) 준공 : 2008. 9. 3

- 하수관거정비 L=0.17km, 23백만원

○ 수산1리 하수관거 정비공사 준공 예정 : 2009. 01

- 하수관거 정비 L=0.1km, 39백만원

10) 서광동리 농어촌 마을하수도 설치사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 서귀포시 안덕면 서광동리 일원

○ 사 업 량 : 소규모하수처리시설 1동(90㎥/일), 하수관거 L=3.83km

○ 총사업비 : 1,600백만원(균특 1,120 , 지방비 480)

○ 사업기간 : ‘07. 12 ～ ’09. 2(장기계속사업)

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
일반회계	시설비	704	254	450	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 장기계속사업으로 발주한 서광동리 농어촌 마을하수도 설치공사에 대하여 낙찰자를 결정하였으나 낙찰예정자 2순위업체에서 1순위업체 입찰참가 자격 및 적격심사 등에 이의가 있어,

○ 제주지방법원에 접수되어 기각된 계약체결 금지등 가처분 신청건으로 인하여 계약 및 공사착공(‘07.12.10) 지연 등으로 당해연도 사업비 일부가 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 명시이월 조치

※ 계약체결 금지등 가처분 신청 기각 결정일 : 2007.11.23

□ 공사추진 및 마무리계획

○ 서광동리 농어촌 마을하수도 설치공사(2차분) 착공 : 2008. 2. 5

- 명시이월액 전액 집행(선금 300백만원, 기성금 150백만원)

○ 서광동리 농어촌 마을하수도 설치공사(2차분) 준공예정 : 2009. 02

11) 추자면(분뇨) 위생처리장 태풍피해복구

□ 사업개요

○ 시설규모 : 분뇨처리시설 5.0㎥/일(메탄화 처리공법)

○ 총사업비 : 351백만원

○ 사업기간 : 08. 1 ～ 08. 11

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
일반회계	시설비	351	-	351	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 본 사업은 추자면 위생처리장 태풍피해복구사업으로 지리적 취약성과 전문성을 요구하는 사업으로 항구적인 복구차원에서 현재 처리공법으로는 향후 발생되는 분뇨처리(발생분뇨 성상이 생분뇨 위주에서 정화오니 위주로 변동됨)에 부적합하여 새로운 공법선정 등 실시설계용역기간이 3개월 이상 소요되어 시기적으로 연내 착공이 어려워 2008년도로 이월하여 추진하게 됨

□ 공사추진 및 마무리계획

○ 기본 및 실시설계 : 2008. 1. 30 ~ 5. 13

○ 공사발주 : 2008. 6. 11

○ 준공예정 : 2008. 11. 8

※ 공정율 98%(10월 말 현재)

12) 서귀포시 동지역 하수관거 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 서귀포시 동지역 일원

○ 사 업 량 : 하수관거정비 L=63.2km

○ 총사업비 : 29,709백만원(국비 20,796 , 지방비 8,913)

○ 사업기간 : 2007년 ~ 2009년

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업특별회계	계	15,716	10,813	4,903	하수도 관리부
	시설비	15,680	10,793	4,887
	부대비	36	20	16

□ 이월사유

○ 하수도원인자부담금 5,000백만원(지방비 부담분)이 ‘07. 11월에 징수됨에 따라 잔여사업을 시행하였으나 완공에 10개월이상 소요되어 절대공기 부족으로 다음연도로 부득이 이월

□ 추진상황 및 마무리 계획

○ 2008. 10. : 5개공구 준공

○ 2008. 12. : 이월액 집행완료 예정

13) 서부(대정)처리장 태풍피해 복구사업

□ 사업개요

○ 사업내용 : 서부처리장 청사 및 중계펌프장 피해복구공사

○ 총사업비 : 52,000천원

○ 사업기간 : 08. 06 ～ 08. 08

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
일반회계	시설비	52	27	25	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 제11호 태풍 “나리”의 영향으로 서부처리장의 등부표가 200m이탈되어 원상복구 시키는 사업비로써 ‘07년도 제2회 추경예산에 반영되었으나 겨울철 해상의 조수간만의 차가 심하고 등부표가 위치한 해상의 조류가 심하여 작업환경을 조성하는데 큰 어려움이 예상되어 부득이 다음연도로 이월

□ 공사추진 및 마무리계획

○ 공사발주 : 2008. 06. 18

○ 준    공 : 2008. 07. 28

14) 제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획 수립용역

□ 용역개요

○ 용 역 비 : 1,220백만원

○ 용역기간 :  ‘07. 8. 9 ~’09. 2. 12( 18개월)

□ 이월액

(단위 : 백만원)
구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	연구개발비	1,220	244	976	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 하수도정비 기본계획 용역 수립 기간이 2007. 8 ~ 2009. 2월까지 18개월 소요되어 절대공기부족으로 다음연도로 명시이월

□ 추진상황 및 마무리계획

○ 2007. 8.  9 : 용역착수

○ 2008. 8. 14 : 중간보고(안)

○ 2009. 2. : 용역준공 예정

15) 농어촌생활용수개발사업(광역상수관로 연계사업)

□ 사업개요

○ 위    치 : 조천읍 대흘 및 남원읍 위미지구

○ 시설규모 : 배수지 2지, 관로 L=7.7Km

- 조천(대흘)지구 : 배수지 1지, 관로 3.0km

- 남원(위미)지구 : 배수지 1지, 관로 4.7km

○ 총사업비 : 4,137백만원(국비 2,428, 지방비 1,709)

○ 사업기간 : 2007. 1 ～ 2008. 11

□ 이월액

(단위:백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
지하수관리특별회계	계	4,137	3,217	920	수자원 개발부
	시설비	4,127	3,207	920
	부대비	10	10	-

□ 이월사유

○ 공사발주 이전에 선행되어야 할 실시설계용역이 하반기(‘07.10월) 완료로 조천지구 광역상수도관로연계공사가 ’07. 11. 12일 착공하였으나 절대공기(12개월)부족으로 부득이 이월

□ 추진상황

○ 남원지구 : 2008. 1. 17 준공(진도100%)

○ 조천지구 : 관로(L=3.0km) 매설 완료, 포장복구 추진 중(진도 95%)

□ 마무리 계획

○ 조천지구 광역관로 연계공사 2008. 11. 11일 준공예정

16) 하수관거사업 실시설계용역

□ 사업개요

○ 사업위치 : 제주시 19개동지역일원

○ 사 업 량 : 실시설계 1식 (하수관거 신설 및 교체 L=2.2㎞)

○ 사 업 비 : 64,625천원(지방비)

○ 용역기간 : 2007. 12. 20 ~ 2008. 10. 10

□ 이월액                                             (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	시설비	65	25	40	제주지역사업소

□ 이월사유

○ 본 용역은 제주시 동지역 각종 주민건의 하수관거정비사업에 따른 실시설계 용역으로서 지역주민들의 각종 건의사항이 수시로 접수되어 과업기간이 ‘07. 12. 20 ~ ’08. 10. 10까지로 절대과업기간 부족 등으로 부득이 이월함.

□ 용역추진상황(완료)

○ 용역 착수 : '07. 12. 20

○ 용역 완료 : '08. 10. 10

17) 마을어장피해(오수방류)에 따른 자원회복사업

□ 사업개요

○ 사업위치 : 제주시 삼양3동 마을공동어장

○ 사 업 량 : 어장복원 갯닦기사업 1식

○ 사 업 비 : 30,000천원(지방비)

○ 사업기간 : 2008. 3. 18 ~ 2008. 6. 19

□ 이월액                                             (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	민간자본보조	30	-	30	제주지역사업소

□ 이월사유

○ 본 사업은 여름철 집중호우시 오수방류에 의한 연안해역 오염으로 인한 해양자원회복을 위한 보조경비로 2회 추경(‘07. 12. 21)시 세출예산에 반영되었으나 사업기간을 감안할 때 연내 사업추진이 불가하여 이월사업으로 추진

□ 사업추진상황(완료)

○ 사업 착수 : '08.  3. 18

○ 사업 완료 : '08.  6. 19

18) 성산포(섭지코지)해양관광단지 상수도 공급사업(급수관 시설사업)

□ 사업개요

○ 시설규모 : L=2.75km (D150～250mm)

○ 총사업비 : 300백만원

○ 사업기간 : 08. 2. 15 ～ 5. 14

□ 이월액                                               (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
상수도사업 특별회계	자본적지출, 비가동설비자산, 건설중인자산, 시설비	300	-	300	서귀포지역 사업소

□ 이월사유

○ 본 사업은 제주국제자유도시 개발계획에 의거 시행중인 성산포(섭지지구) 해양관광단지에 상수도를 공급하기 위한 원인자부담금사업으로 ‘07.8.27일 사업자로부터 원인자부담금이 납부되어 제2회 추경(’07.12.21)시 세출예산에 반영하였으나, 공사기간을 감안할 시 연내 공사추진이 불가하여 ‘08년 이월 추진

□ 공사추진 및 마무리계획

○ 공사 추진 완료(‘08.5.14)

19) 성산포(섭지코지)해양관광단지 상수도 공급사업(유수율 제고사업)

□ 사업개요

○ 누수탐사 : L=139km (7개마을)

○ 총사업비 : 144백만원

○ 사업기간 : 08. 6. 27 ～ 12. 26

□ 이월액                                              (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
상수도사업 특별회계	자본적지출, 무형자산, 무형자산, 무형자산취득비	144	-	144	서귀포지역 사업소

□ 이월사유

○ 본 사업은 제주국제자유도시 개발계획에 의거 시행중인 성산포(섭지지구) 해양관광단지에 상수도를 공급하기 위한 원인자부담금사업으로 ‘07. 8.27일 사업자로부터 원인자부담금이 납부되어 제2회 추경(’07.12.21)시 세출예산에 반영하였으나, 공사기간을 감안할 시 연내 공사추진이 불가하여 ‘08년 이월 추진

□ 공사추진 및 마무리계획

○ 공사 발주 : 2008. 5. 26       ○ 준공 예정 : 2008. 12. 26

○ 현재 누수탐사 공정율 70%이며 계획된 기간내에 사업 마무리

사고이월

1) 신효지구 광역상수도 연계공사

□ 사업개요

□ 사업개요 : PEP폴리에틸렌 피복강관부설 L=630m (D200mm)

폐기물처리 (폐아스콘 201톤) 1식

□ 총사업비 : 70백만원

□ 사업기간 : ‘07. 10. 31 ～ ’08. 3. 29

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
상수도사업특별회계	자본적지출,가동설비자산, 구축물, 시설비	70	-	70	상수도 관리부

□ 이월사유

□ 본 공사는 광역상수도 급수취약지역으로 태풍 “나리” 내습시 급수중단지역으로 ‘07. 10. 31일 착공함에(준공기한 ’08년 3. 29일) 따라 절대공기 부족으로 부득이 사고이월 불가피

□ 공사추진 및 마무리계획

□ 2008. 2. 15 : 신효지구 폐기물처리 용역완료

□ 2008. 3. 28 : 신효지구 광역상수도 연계사업완료

2) 제주국제자유도시기반시설 용수공급사업(시설비)

□ 사업개요

□ 공 사 명 : 국제자유도시기반시설사업(토목․건축 2건, 전기4건, 기계2건)

□ 사업기간 : 2007. 6. ～ 2008.  6.

□ 사 업 비 : 2,690백만원(국비 100%)

□ 사업내용 : 산천단배수지 시설공사외 9건(시설7건, 감리용역2건)

- 산천단배수지시설(1건․1,260백만원) : 배수지 3,000톤/1지, 송배수관 D=300mm L=474m

- 아라가압장 시설 (9건․1,430백만원)

․가압시설(1건) : 가압시설(기계,전기실) 1식, 관리사무실(54.78㎡) 1동

․전기시설(5건) : 수배전반시설 1식, 계장 및 자동제어시설 1식

․기계시설(1건) : 가압모터펌프 시설 1식

․감리용역(2건) : 전기 및 건축감리용역

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목 (자본적지출, 가동설비자산)	예산현액	07년집행액	이월액	비 고
상수도사업 특별회계	계	2,556	11	2,545
	구축물, 시설비	2,530	-	2,530	상수도 관리부
	구축물, 감리비	15	-	15
	구축물, 시설부대비	11	11	-

□ 이월사유

□ 제주국제자유도시 기반시설 용수공급시설에 따른 배수지(3,000톤/1지) 및 가압장 시설 등으로 ‘07. 6. 4일 착공(준공기한 ’08. 6. 3)함에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월사업으로 추진

□ 공사추진 및 마무리계획

□ 2008.  6월 : 사업완료

3) 추자식수원개발사업(시설비)

□ 사업개요

□ 사업량

- 저류조 1지(500M/T), 도수로 117m

- 수중모터펌프(60마력×양정85m) 2대, 취수구 하상 정비 20m

□ 사 업 비 : 1,466백만원(국비 1,033, 도비 433)

□ 사업기간 : 2007. 11. 9 ～ 2008. 7. 21

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액		‘07 집행액	이월액	비 고
상수도사업 특별회계	자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비	합 계	1,466	1,048	418	상수도관리부
		명시이월	116	-	116
		사고이월	1,350	1,048	302

□ 이월사유

□ 추자식수원 개발사업의 일환으로 추진하는 묵리 복류수 이용시설공사로서  지하수개발(2공) 및 이용시설은 기 완료하였으나 동 공사인 경우 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월

□ 공사추진 상황(준공완료)

□ 공사착공 : 2007. 11.  9.

□ 공사준공 : 2008.  7. 21.

4) 태풍“나리”피해복구 공사(시설비)

□ 사업개요

□ 개    요 : ‘07.9.13~9.18 기간중 제11호 태풍 ’나리‘로 인한 피해가

발생한 상수도 시설에 대한 피해복구사업

□ 총사업비 : 5,838백만원

□ 사업기간 : 07. 12 ～ 08. 11

□ 이월액                                              (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
상수도사업 특별회계	자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비 (감리비,시설부대비 포함)	3,153	122	3,031	상수도 관리부

□ 이월사유

□ 태풍“나리”피해복구비(‘07.10.22) 확정, 사전집행승인(’07.11.19), 제2회 추경(‘07.12.21)확정으로 절대공기가 부족하여 부득이 다음연도 이월

□ 공사추진상황(완료)

❍ 사업장별 내역

(단위 : 백만원)

사업구분		총계		‘07완료		‘08이월 추진
		건수	금액	건수	금액	소 계		건설개량		사고이월
						건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계		75	5,838	10	122	65	5,716	6	2,685	59	3,031
본 부	소 계	48	4,730	10	122	38	4,608	5	2,658	33	1,950
	취정수장	47	2,700	10	105	37	2,595	4	645	33	1,950
	어 승 생	1	2,030	-	17	1	2,013	1	2,013	-	-
제주지역	취정수장	27	1,108	-	-	27	1,108	1	27	26	1,081

❍ 완  료 : 75건․5,838백만원(이월기준)

-  2008.  10월 : 태풍 피해복구공사 전체 사업완료

- 취수원 도수로복구, 취수원 준설, 옹벽시설에 대해서는 우기전    (‘08. 6월) 완료하여 제2의 피해 사전 예방함

5) 제주특별자치도 수도정비기본계획 수립 용역

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 제주특별자치도 수도정비기본계획 수립 용역

□ 사업범위 : 제주특별자치도 전역

□ 사 업 비 : 698백만원 (도비)

□ 수립근거 : 수도법 제4조

□ 목표연도 : 2025년 (제주특별자치도 광역도시계획과 연계 수립)

□ 사업기간 : 2007. 2. 9 ～ 2008. 5. 2

□ 이월액

(단위:백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
제주도개발사업 특별회계	사업예산 자체사업	698	351	347	상수도 관리부

□ 이월사유

□ 상수도 통합에 따라 수도법 제4조 규정에 의거 「제주특별자치도 수도정비기본계획수립」을 위하여 ‘2006. 10 통합예산 편성 시 예산을 확보, 명시이월하여 사업을 추진하였으나,

□ 절대공기가 360일 소요되어 계약기간이 부족하고, 특히 본 용역 발주후 수도정비기본계획수립지침(‘07. 4월 환경부)이 개정되면서 노후관로 개량계획, 불록화계획, 설비 및 시스템 개량계획 수립 등 과업이 증가하여 과업기간 연장이 불가피함에 따라 부득이 사고 이월하여 추진

□ 추진상황

□ 2007.  2. 9  : 용역 착수

□ 2008.  5. 2  :  과업 완료

6) 연동지역 분류식 하수관거 정비공사

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 하수관거정비 L=46.5㎞

○ 총사업비 : 20,572백만원(국비 9,877  지방비 10,695)

○ 사업기간 : 2005. 7 ～ 2008. 2

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	시설비	8,076	7,061	1,015	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 연동지역 분류식 하수관거 교체공사는 2005. 7 ~ 2008. 2월까지 추진한 장기 계속 공사로서,

○ 연동 시가지내에서 동시 다발적으로 공사 시행시 교통 및 주차난을 고려하여 총 5개 공구로 나누어 1차 ~ 5차별로 순차적으로 추진 시행하였으며, 기 확보된 국고 집행율을 최대화하기 위해 집행잔액을 갖고 5차분 공사를 발주하여 착공(‘07. 7. 28)한 바, 절대공기부족(’08. 2. 22 준공 예정)으로 부득이 이월 추진함.

□ 공사 추진상황 및 마무리계획

○ 2005. 7. 14 : 전체공사 착공

○ 2008. 2. 22 : 공사 준공

7) 병문펌프장~처리장간 예비압송 차집관로 시설공사

□ 사업개요

○ 시설규모 : 압송관 시설 L=414m, 입축사류펌프 2대

○ 총사업비 : 640백만원(국비 320, 지방비 320)

○ 사업기간 : 2007. 12 ～ 2008. 5

□ 이월액                                              (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	시설비	640	473	167	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 본 사업은 기존 압송관로 노후화 및 누수 현상 등에 대비를 위한 병문펌프장 ~ 도두하수처리장간 예비압송 관로 시설공사로서, 4공구로 나누어 발주 추진하였고(L=4.372㎞, D900m/m, 공사기간 : ‘05. 7 ~ ’07. 6. 4)

○ 또한, 충분한 압송계획 물량 확보를 위해 기존 노후펌프(2대)에 대하여 양정 기술 검토 및 제반사항을 검토하여 발주 및 계약 체결을 추진하는 과정에서 부득이 ‘07. 12월에 계약하게 되어 절대공기(’08. 5. 16 준공)가 부족하여 이월 조치하게 되었음.

□ 공사 추진상황 및 마무리계획

○ 2007. 12. 28 : 공사 착공

○ 2008.  5. 16 : 공사 준공

8) 하수관거정비사업 감리용역

□ 용역개요

○ 감리과업내용 : 연동지역 하수관거정비 1식, 예비압송관로 시설 1식

○ 총사업비 : 794백만원

○ 용역기간 : 2006. 5 ～ 2008. 5

□ 이월액                                              (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	감리비	560	437	123	하수도 관리부

□ 이월사유

○ 본 감리용역은 ‘06. 5월 ~ ’08. 5월까지 장기 계속 공사로 추진한 연동지역 분류식 하수관거 및 예비압송 차집관로 시설공사 전면책임감리용역으로써,

○ 공사 추진계획에 맞추어 공사 책임감리를 시행하여야 할 실정으로 부득이 이월 조치하게 되었음.

□ 용역 추진상황 및 마무리계획

○ 2006. 5. 22 : 용역 착공

○ 2008. 5. 20 : 용역 준공

9) 제주대입구 ~ 도남e편한세상 APT간 하수도 비굴착보수공사

□ 사업개요

○ 사업위치 : 제주시 아라동 및 이도2동일원

○ 사 업 량 : 하수도정비 L=1,798m

○ 사 업 비 : 32,344천원(지방비)

○ 사업기간 : 2007. 12. 24 ~ 2008. 1. 15

□ 이월액                                              (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	시설비	32	-	32	제주지역사업소

□ 이월사유

○ 본 사업은 기존하수관 파손으로 인해 주택 및 인근 도로상에 오수등이 누수되어 긴급하게 시행한 사업으로 ‘07. 12. 24일 착공(준공기한 ’08. 1. 15)함에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월사업 추진

□ 사업추진상황(완료)

○ 사업 착수 : '07. 12. 24

○ 사업 완료 : '08.  1. 15

10) 화북동 거로마을일원 간이펌프장 시설공사

□ 사업개요

○ 사업위치 : 제주시 화북동일원

○ 사 업 량 : 하수도시설 L=155m, 펌프시설 1식

○ 사 업 비 : 13,225천원(지방비)

○ 사업기간 : 2007. 12. 24 ~ 2008. 1. 14

□ 이월액                                            (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	시설비	13	-	13	제주지역사업소

□ 이월사유

○ 본 사업은 하수미처리구역에 대하여 생활오수등을 차집하기 위하여 2회 추경(‘07.12.21)시 화북동에 재배정된 사업과 병행하여 추진함에 따라  ‘07.12.24일 착공(준공기한 ’08.1.14)함에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월

□ 사업추진상황(완료)

○ 사업 착수 : '07. 12. 24

○ 사업 완료 : '08.  1. 14

11) 봉개동 서회천마을일원 하수도 정비공사

□ 사업개요

○ 사업위치 : 제주시 봉개동(서회천)일원

○ 사 업 량 : 하수도정비 L=75m

○ 사 업 비 : 18,501천원(지방비)

○ 사업기간 : 2007. 12. 24 ~ 2008. 1. 15

□ 이월액                                            (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	시설비	18	-	18	제주지역사업소

□ 이월사유

○ 본 사업은 기존하수관 노후로 인해 환경오염 및 악취발생등으로 긴급하게 시행한 사업으로 ‘07. 12. 24일 착공(준공기한 ’08. 1. 15)함에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월

□ 사업추진상황(완료)

○ 사업 착수 : '07. 12. 24

○ 사업 완료 : '08.  1. 15

12) 사라봉5거리 남동측외 시일원 하수도 흡입준설공사

□ 사업개요

○ 사업위치 : 제주시 건입동외 시일원

○ 사 업 량 : 하수도 흡입준설 L=9,480m

○ 사 업 비 : 32,344천원(지방비)

○ 사업기간 : 2007. 12. 27 ~ 2008. 1. 14

□ 이월액                                              (단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
하수도사업 특별회계	시설비	32	-	32	제주지역사업소

□ 이월사유

○ 본 사업은 하수관에 각종 이물질이 퇴적되어 유수흐름저하 및 악취발생등으로 인근 지역주민들에게 막대한 피해를 주고 있어 긴급하게 시행한 사업으로 ‘07.12.27일 착공(준공기한 ’08.1.14)함에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월

□ 사업추진상황(완료)

○ 사업 착수 : '07. 12. 27

○ 사업 완료 : '08.  1. 14

13) 국도 확포장구간 상수도관 이설사업

□ 사업개요

○ 시설규모 : L=8.29km (D30～350mm)

○ 총사업비 : 293백만원

○ 사업기간 : 08. 11 ～ 08. 12

□ 이월액

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	예산현액	‘07년집행액	이월액	비 고
상수도사업 특별회계	자본적지출, 비가동설비자산, 건설중인자산, 시설비	293	218	75	서귀포지역 사업소

□ 이월사유

○ 본 사업은 안덕～대정간 지방도 확포장공사와 병행하여 추진하는 공사로서 도로 확포장 공사중 배수시설 해양방류 지점 변경에 대한 집단 민원 발생으로 도로확포장공사가 중단됨에 따라 불가피하게 상수도관 이설공사도 시공정지(2007.12.18)된 상태임. 민원 해결 및 도로공사의 토공이 완료되어야 상수도관 이설공사도 시행이 가능함에 따라 부득이 이월하여 추진함.

□ 공사추진 및 마무리계획

○ 공사정지 해제 : 2008. 11

○ 준공예정 : 2008. 12

○ 현재 집단 민원이 해결되고 도로공사의 토공이 일부 진행되고 있으며 상수도관 이설이 가능한 11월부터는 사업 추진이 가능하여 계획된 기간내에 사업 마무리

12. 2008 예산집행내역(시설비, 연구개발비. ‘08.9.30기준)

❏ 상수도사업특별회계(시설비)

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
상수도관리부	월산 및 연동3호배수지 건설폐기물처리	철근폐콘크리트 1,367ton	31	27	4	집행잔액
“	월산정수장 급속침전지 정비공사	-급속침전비 425㎥ -침전지 1,481㎥	40	34	6	“
“	신촌지선 광역상수도 연계공사	신촌리 L=2,600m (PEP피복강관D=200㎜)	427	390	37	“
“	조천지선 광역상수도 연계공사	신촌리 L=3,430m (PEP피복강관D=200㎜)	528	485	43	“
“	강정정수장원격관리시템제작설치공사	원격관리시스템 1식	496	414	82	“
“	외도수원지 무인자동화 시스템 제작설치공사	무인자동시스템 1식	108	88	20	“
“	지하수관정원격관리시스템 제작설치공사	지하수 원격관리 시스템 30개소	321	270	51	“
“	용담수원지 무인자동화 시스템 제작설치	무인자동화제작 설치 1식	52	43	9	“
“	오라정수장 원격관리 시스템 제작설치	원격관리시스템 1식	283	233	50	“
“	지하수 낙뢰방지장치 시설공사	낙뢰방지 26개소	91	78	13	“
“	이호수원지 무인자동화 제작설치	무인자동화 1식 고압배전반 1식	269	220	49	“
“	광역정수장 운영실 제어용 중앙서버 교체	정수장운영실 4개소	94	82	12	“
“	예비용 지하수 압상파이프 제작 구입	스텐파이프 200본	77	56	21	“
“	광역정수장 자동화설비 교체설치	배터리 교체 9개소 UPS 교체설치 6개소	138	118	20	“
“	덕수가압장 수중모터펌프 교체공사	수중모터펌프 100HP 1대교체	31	27	4	“
“	오라정수장 자동여과기 증설공사	자동여과기 증설 1기 5,000㎥/일	272	264	8	“
“	삼양1,2수원지 무인자동시스템제작설치	무인자동시스템 제작 설치 1식	166	133	33	“

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
상수도관리부	사라봉정수장 무인자동 시스템 제작설치	무인자동시스템 제작설치 1식	75	63	12	“
“	월산정수장 홍보관 인테리어 공사	홍보관 인테리어공사 1식 홍보관 전기공사 1식	51	46	5	“
“	강정정수장 홍보관 인테리어 공사	홍보관 인테리어공사 1식 홍보관 전기공사 1식	71	65	6	“
“	추자도 식수원 개발사업(묵리 복류수 이용)	저류조(500톤) 1지, 도수로 117m, 휀스 89.5m, 펌프(60마력*양정 85m) 2대	302	297	5	“
“	추자 예초리 복류수 이용시설 증설공사	송수관로(PE 100mm) 1,206.1m	60	59	1	집행잔액
“	추자 저수지 및 담수화시설 급속여과기여재 교체공사	제3저수지 2기, 담수화동 4기	40.2	39.8	0.4	“
“	우도 예비 배수지 개량공사	철근 콘크리트 스라브(8.5*7.5) 1개소 배수지 방수(시멘트액체방수) 163㎡ 잡철 및 염소투입기설치 1식	26	25	1	“
“	추자 묵리 예초리 복류수시설 전기공사	전기인입설비1식, 기동반설치 1식	31.2	30.9	0.3	“
“	추자지하수이용 전기공사	신양리관정 1개소 묵리관정 및 복류수 전기공사	82	82	-	“
“	추자 지하수 수중모터펌프 설치공사	지하수개발수중모터펌프(25HP) 원수순환용 수중모터펌프(25HP) 담수화시설 고압펌프(75HP)	217.8	217.7	0.1	“
〃	우도해저상수도 시설 사업	기본및실시설계용역 1식, 관로공사13.3Km 배수지 2,050톤	2,000	428	1,572	2008~2010년까지 연차적 사업임

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
상수도관리부	수원지 등 녹조방지용 폭기시설 설치	태양광 폭기시설(물순환장치) 1대	75	-	75	발주 진행 중
〃	상수원보호구역 주민편익사업	상수원보호구역토지매입 1식	237	160	77	토지매입 협의 중 (‘08. 11월~12월 완료)
〃	한동배수지 확장공사	배수지400㎥1지 관로200m/m, 111m	246	-	246	입찰 공고 중
〃	삼화택지개발지구용수공급사업	배수지 시설 2,000㎥ 1지	950	-	950	준공시기 미도래 (‘08. 12. 14)
〃	예비용 수중모터 및 정량펌프 구입	양수모터 25대 정량펌프 64대	425	235	190	11월중 양수모터 추가 구입 예정
〃	금산취수원 무인시스템구축	무인시스템구축 1식	180	-	180	준공시기 미도래 (‘08. 12. 8)
〃	취․정수장 펌프, 시설물 교체	취․정수장 펌프, 시설물 교체1식	510	333	177	‘08. 11~12월 수시 교체사업 추진
제주지역 사업소	급수취약지역해소 및 노후관 교체사업	D=15~400㎜ L=96,968M	6,883	6,400	483	입찰잔액
서귀포지역사업소	상수도 노후관 교체사업	D=15~100mm L=37,700m (32개지역)	3,265	3,106	159	집행잔액
“	남원리 노후관 교체	L=2,300m D16~100㎜	142	-	142	‘09년도 시행예정인 하수관거 BTL사업구간으로 병행시공 불가피
“	토산리 노후관 교체	L= 700m D16~150㎜	43	-	43	계약 체결 중
“	성산리 노후관 교체	L= 500m D16~100㎜	31	-	31	발주 진행 중
“	성읍리 노후관 교체	L= 800m D16~100㎜	49	-	49	계약 체결 중
“	수압조절용 노후제수변 공사	30개소 D=15~100mm	53	53	-	-

❏ 일반회계(시설비)

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
하수도 관리부	제주시 읍․면지역 하수관거 정비사업	하수관거 12.92km	9,706	5,484	4,222	준공 미도래 (‘09. 1. 18)
“	제주시 농어촌 마을 하수도 정비사업	개량 2개소, 신설 1개소	1,599	758	841	‘08.7.28 착공 준공 미도래 (‘09. 6. 30))
“	소규모 하수관거 정비	하수관거 정비 1식	550	200	350	준공 미도래 (‘09. 2. 20)
“	하수처리장 방류수 재이용사업	방류수재이용시설 1식 Q=5,000㎥/일	1,000	-	1,000	'08.10.20착공 준공 미도래 (‘09. 12. 31)
“	서귀포시 농어촌마을 하수도 정비사업	신설 2개소 개량 1개소	2,366	2,302	64	준공시기 미도래 (‘09. 02. 20)
〃	서귀포시 농어촌마을 하수도보수사업	농어촌마을하수도보수1식	103	39	64	준공시기 미도래 (‘09. 01. 30)
〃	서귀포시 읍ㆍ면지역 하수관거정비사업	우․오수 분류 L=16.1km	9,018	7,395	1,623	준공시기 미도래 (‘08. 12. 30)
“	중계펌프장 비상발전기 설치공사	발전용량 200kw 1식	30	24	6	집행잔액
“	하수처리장 시설물 정비	하수처리장 시설물 정비	52	46	6	집행잔액
“	중계펌프장 준설(25개소)	준설공사 1식	20	6	14	11월초 발주예정
“	중계펌프장(협재) 비상발전기 설치	발전용량 300kw 1식	30	30	-	-
“	하수처리장 시설물정비	시설물 정비	30	30	-	-
“	중계펌프장 준설(25개소)	준설공사 1식	32	28	4	집행잔액
“	방류관 수중촬영 (대정하수처리장)	D=1200m, L=1,000m 방류관 촬영 1식	4	2	2	상반기 시행 완료 ‘08.10.31 시행요청
“	처리장 및 펌프장 침사지 준설(대정하수처리장)	준설공사 1식	14	14	-	-
“	위생처리장 화학반응조 설치(대정하수처리장)	화학반응조 설치 1식	36	36	-	-
“	방류관로 등부표 도색 (대정하수처리장)	등부표 도색 1식	36	26	10	집행잔액
“	위생처리장 행정LAN망 설치 (대정하수처리장)	LAN망 설치1식	5	4	1	집행잔액

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
하수도 관리부	하수종말처리장 및 중계펌프장 준설(성산하수처리장)	준설공사 1식	8	7	1	집행잔액
“	성산하수종말처리장 정비공사	펌프장 2개소 배관공사	8	8	-	-
“	초음파수위계 설치공사 (성산하수처리장)	계측기반 1식	7	7	1	집행잔액
“	해양 방류관로 수중 촬영 (성산하수처리장)	D=700mm L=982m 방류관 촬영 1식	4	2	2	집행잔액
“	방류관 수중촬영 (남원하수처리장)	방류관 촬영 1식	4	2	2	집행잔액
“	처리장 및 펌프장 침사 준설 (남원하수처리장)	준설공사 1식	8	6	2	집행잔액
“	고양정수중펌프 수리 (호근위생처리장)	수리 1식	5	-	5	11월초 발주예정
“	탈취펜수리 (호근위생처리장)	수리 1식	5	-	5	11월초 발주예정
“	자동협잡물처리기 수리 (호근위생처리장)	수리 1식	5	2	3	집행잔액
“	가압모노펌프수리 (호근위생처리장)	수리 1식	5	4	1	집행잔액
“	원심탈수기 교체 (호근위생처리장)	교체 공사 1식	50	38	12	집행잔액
“	호근위생처리장 협잡물자동종합처리기 교체공사	교체공사 1식	360	270	90	입찰잔액
제주지역 사업소	하수도 흡입준설공사	흡입준설 L=84,600m	180	129	51	10.14일 조천읍 외 읍면지역일원 공사 발주(51백만원)

❏ 하수도사업 공기업특별회계(시설비)

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
하수도 관리부	제주시 동지역 하수관거 정비공사	하수관거 47.1km	12,591	9,197	3,394,	계속비공사 ‘10. 8. 준공예정
“	하수슬러지처리시설사업	슬러지처리시설 70톤/일	2,285	-	2,285	‘08. 10. 30 착공 ‘10. 6. 30준공예정 (계속비공사)
“	고도처리시설사업	고도처리시설(Q=130,000㎥/일) 및 노후시설 개량 1식	7,361	7,361	-	-
“	연동 은남 5로 “걷고싶은거리” 분류식 하수관거 시설공사	하수관거정비L=492m	280	-	280	2회 추경 확보 공사 발주 (‘08. 10. 29 )
“	‘08 하수관거 BTL사업 운영준비(기본설계 등)	‘08 BTL사업 기본계획 용역 1식	650	-	650	준공 미도래 (‘08. 12. 2)
“	차집관로 보수	차집관로 보수 L=535m	200	194	6	집행잔액
〃	중계펌프장 및 간이펌프장 준설	V= 303㎥	90	56	34	11월초 발주예정
〃	수질TMS 자동 측정기 설치	수질원격감시체계 1식	272	271	1	집행잔액
“	하수처리장 저압펌프 분전반 교체	MCC반, LOP반 제작설치	225	186	39	집행잔액
“	수질TMS 자동측정기 설치 실시설계비	수질TMS 자동측정기 설치 실시설계	15	6	9	자체설계 예산절감
제주지역 사업소	소규모 주민건의사항 해소사업	하수도 L=1,180m	600	500	100	․10.2일 화북공업 단지 하수도정비 공사 발주(53백만원) ․집행잔액 11월중 발주예정(47백만원)
“	하수도 흡입준설공사	흡입준설 L=254,070m	600	473	127	․10.14일 연동지구외 2개지구 공사 발주 (127백만원)
“	하수도 보수사업	하수도 L=723m	500	382	118	․10.2일 이호민주 빌라앞외 1개소 하수도 정비 공사 발주 (52백만원) ․집행잔액 11월중 발주예정(66백만원)

❏ 하수도사업 기타특별회계(시설비)

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
하수도 관리부	서귀포시 동지역 하수관거정비사업	우․오수 분류 L=21.2km	11,284	9,519	1,765	준공 미도래 (‘09. 2. 20준공예정)
“	처리장 및 펌프장 기계배관 도색(보목하수처리장)	배관 도색 1식	20	10	10	집행잔액
“	침사인양기보수 (보목하수처리장)	보수 1식	6	2	4	집행잔액
“	약품공급탱크시설수리 (보목하수처리장)	시설 수리 1식	2.5	2.5	-	-
“	기계동,저류조 및 농축조 준설(보목하수처리장)	준설1식	5	-	5	11월초 발주예정
“	서귀,자구리펌프장 펌프 수리 (보목하수처리장)	수중펌프 및 전동밸브 수리	18	15	3	집행잔액
“	펌프장 침사준설 공사 (보목하수처리장)	펌프장 준설 1식	32	9	23	상반기 시행 완료 ‘08.10.22 시행요청
“	보목1,2 정방펌프장 오수펌프 수리 (보목하수처리장)	오수펌프 수리 1식	15	2	13	11월초 발주예정
“	시설노후 수중펌프 수리 (보목하수처리장)	수중펌프 수리 1식	5	1	4	집행잔액
“	처리장 ASS교체공사 (보목하수처리장)	진공차단기 교체 1식	5	5	-	집행잔액
“	기계동, 수처리장 탈취시설 수리 (보목하수처리장)	수리 1식	5	-	5	11월초 발주예정
“	DCS제어판넬 오버홀 작업(보목하수처리장)	보수 1식	10	-	10	11월초 발주예정
“	보목처리장 방류관 수중촬영	D=800mm L=1,096m	3	3	-	-
“	변전실 및 처리장 전기시설 보수 (보목하수처리장)	제어반 보수 1식	10	8	2	집행잔액
“	서귀, 자구리 전기시설 보수(보목하수처리장)	리액터 교체 1식	10	6	4	집행잔액
“	수질원격감시체계 (TMS)구축사업 (보목하수처리장)	구축사업	300	200	100	집행잔액
“	보목처리장 등부표 2기 교체공사	교체공사	15	-	15	11월초 발주예정
“	펌프장 오수압송관보수 (보목하수처리장)	기기교체 및 보수 1식	15	15	-	-
“	유압식 케이크호퍼 교체 (보목하수처리장)	호퍼교체 1식	65	-	65	11월초 발주
“	처리장 및 중계펌프장 비상발전기 설치 (보목하수처리장)	자구리,서귀,보목(Ⅰ.Ⅱ) 4개소	230	200	30	집행잔액
“	중문동부펌프장 저압 케이블 교체공사 (색달하수처리장)	교체공사 1식	10	9.7	0.3	집행잔액
“	펌프장 전기시설 보수 (색달하수처리장)	보수공사 1식	5	-	5	11월초 발주예정

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
하수도 관리부	TMS(수질자동측정기)장치 설치공사 (색달하수처리장)	수질원격 감시체계1식	300	200	100	집행잔액
“	처리장 기계 및 배관도색 (색달하수처리장)	조합페인트 27.98㎡	3	3	-	-
“	펌프장 기계 및 배관도색 (색달하수처리장)	펌프장 13개소	9	8	1	집행잔액
“	수처리동 및 펌프장 호이스트 수리 (색달하수처리장)	수리 1식	5	-	5	11월초 발주예정
“	수중펌프 수리 (색달하수처리장)	수리 1식	10	-	10	11월초 발주예정
“	침사인양기 수리 (색달하수처리장)	수리 1식	6	-	6	11월초 발주예정
“	방류관수중촬영 (색달하수처리장)	D=800mm L=1,042m 방류관 촬영	3	2	1	집행잔액
“	육상펌프 수리 (색달하수처리장)	수리 1식	3	-	3	11월초 발주예정
“	오수압송관로 보수공사 (색달하수처리장)	보수공사 1식	10	-	10	11월초 발주예정
“	펌프장 유입게이트 보수 (색달하수처리장)	보수 1식	4	-	4	11월초 발주예정
“	펌프장 침사준설 공사 (색달하수처리장)	준설 14개소 V=57㎥	35	28	7	집행잔액
“	대포펌프장 계측설비 및 전동수문 교체공사 (색달하수처리장)	교체공사 1식	20	20	-	-
“	성천포펌프장 호이스트 교체공사 및 저류조 맨홀뚜껑 교체 (색달하수처리장)	교체공사 1식	20	20	-	-
“	UV소독조 램프, 안정기 교체공사 (색달하수처리장)	자외선램프 외 3종 30조	38	33	5	집행잔액
“	신시가지 중계펌프장 비상발전기 설치공사 (색달하수처리장)	비상발전기 1식	75	75	-	-
“	대포펌프장 오수펌프 교체공사 (색달하수처리장)	수중펌프 55㎾×40m	25	-	25	'08.09.16 계약요청 입찰공고 중
서귀포지역사업소	서귀포시 하수도 시설 정비공사	불량맨홀정비 349개소	298	-	298	'08.11.4 입찰공고중

❏ 지하수관리특별회계(시설비)

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
수자원 개발부	지하수 폐공 원상복구사업	지하수관정 50공	150	147	3	낙찰차액
“	지하수 계량기 교체사업	지하수 계량기 120개	50	42	8	잔액 12월 집행
“	지하수 무인 원격검침 시스템 구축	지하수관정 40공 (사업장 10개소)	250	219	31	낙찰차액
“	광역상수도 2단계 건설사업	송수관로 0.76㎞ 감시정 7개소 중앙통제실 개선 1식	4,782	1,989	2,793	․12월 준공시 집행(2,246백만원) ․감시정 1공감소 (547백만원)
“	농어촌 생활용수 개발사업	배수지 1지 관로 6.95㎞	3,529	1,238	2,291	․덕천지구 12월 준공예정(1,120백만원) ․예래․중문지구 10월 착공(1,171백만원)

❏ 하수도사업 기타특별회계(연구개발비)

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	미집행사유
하수도 관리부	광역하수도정비기본계획	기본계획 수립 1식	976	976	-	-

13. 각종 공사 및 물품구입 발주현황(건당 20백만원이상)

❏ 2006년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
어승생수원지 관리사무소건물 리모델링 공사	건물리모델링 1동	‘06.11.20 ～12.26	55	(주)부성 이엔씨 이석우	견적입찰	공사완료	상수도 관리부
어승생수원지 울타리 정비공사	울타리정비 L=137m 안전난간시설 L=28.3m	‘06.11.27 ～12.15	24	(주)삼미기업 고윤성	견적입찰	공사완료	“
어승생수원지내 조경(잔디식재) 공사	줄떼 3,110.4㎡	‘06.11.22 ～12.11	23	한솔조경 이요현	견적입찰	공사완료	“
명도암가압장 수배전반 시설공사	수배전설비 1식	‘06.11.6 ~12.26	27	전남전력 박금례	견적입찰	공사완료	“
한림정수장 수질연속측정 장치시설 전기공사	수질연속측정 장치 5개소	‘06.11.14 ~12.26	34	금강전기공사 문경택	견적입찰	공사완료	“
강정정수장외 1개소 수질연속 측정장치시설 전기공사	강정정수장6개소 서림정수장6개소	‘06.11.30 ~12.26	56	대우전기 현인길	제한경쟁	공사완료	“
별도봉정수장 외4개소 탁도연속측정장치시설 전기공사	별도봉정수장 7개소 오라정수장 4개소 사라봉정수장 5개소 월산정수장 6개소 도련정수장 5개소	‘06.10.31 ~12.22	60	성창종합건설 양성은	제한경쟁	공사완료	“
대정읍 신평리 분류식 하수관거 시설공사	하수관거 L= 4.5km	‘06.09.01 ～‘07.2.27	843	가나종합건설(주) 조학봉	경쟁입찰	공사완료	하수도 관리부
동홍천 하수도 보수공사	하수관거 L=0.32km	'06.10.02 ~12.26	90	경보종합건설 고후석	경쟁입찰	공사완료	“
대정읍 신평리 소규모 오수처리 시설공사	오수처리시설 1개소(90㎥/일)	‘06.10.23 ～‘07.1.30	146	서진환경(주) 강원보	경쟁입찰	공사완료	“
대포동 하수도 시설공사	하수관거 L=0.33km	'06.11.20 ~ '07.3.16	51	(주)성장건설 강용택	경쟁입찰	공사완료	“
천서동 하수관거 정비공사	하수관거 L=2.3km	'06.12.7 ~'07.5.30	319	경림종합건설(주) 박현길	경쟁입찰	공사완료	“
도순지구하수관거 정비공사	하수관거 L=0.29km	'06.12.27 ~'07.2.13	23	협성건설(주) 양연선	견적입찰	공사완료	“
하원법화사로 하수관거정비공사	하수관거 L=0.49km	'06.12.04 ~'07.5.28	77	청암토건(주) 정재필	경쟁입찰	공사완료	“
대천동 하수관거 정비공사	하수관거 L=2.08km	'06.12.05 ~'07.5.25	269	성보토건(주) 강태욱	경쟁입찰	공사완료	“
동홍택지지구내 하수관거정비공사	오수관정비 134개소 164개소 하수관준설 V=96㎥	'06.12.12 ~ 07.5.25	250	(합)동남종합건설 고광민	경쟁입찰	공사완료	“
보목동 하수관거 정비공사	하수관거 L=0.47km	'06.12.13 ~ '07.5.8	139	도화건설 부우훈	경쟁입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
삼성여고주변지역 하수관거정비공사	하수관거 L=1.81km	'06.12.13 ~ '07.5.23	232	신대홍종합 건설(주) 김홍숙	경쟁입찰	공사완료	하수도 관리부
상예지구하수관거 정비공사	하수관거 L=4.6km	'06.12.12 ~ '07.8.7	667	(주)반석주택 김갑봉	경쟁입찰	공사완료	“
동여자중학교 일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=26,298m	'06.03.10 ~4.28	67	한마음건설 강종철	경쟁입찰	공사완료	“
노형로타리 북측일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=25,170m	'06.04.05 ~05.17	65	한마음건설 강종철	경쟁입찰	공사완료	“
추자 대서리 오수처리시설공사	오수처리시설 1식	‘06.07.06 ~‘07.03.06	1,027	(주)경원산업 손유원	경쟁입찰	공사완료	“
사대부고~용연교간 예비압송 차집관로 시설공사	주철관 L=414m	'06.12.05 ~'07.06.04	455	영해건설㈜ 박용철	경쟁입찰	공사완료	“
추자 대서리 오수관로시설공사	오수관 L=955m, 압송관 L=280m	‘06.12.08 ~‘07.02.25	236	민경건설(주) 조덕천	경쟁입찰	공사완료	“
연동지역 분류식 하수관거 교체공사(3차)	PE관L=12,302m 사각수로관 L=3,417m	'06.12.14 ~'08.4.15	4,847	지큐종합 건설 김대홍	경쟁입찰	공사완료	“
연동지역 분류식 하수관거 교체공사(4차)	PE관 L=1,000m 사각수로관L=642m HI-3P L=210M	'06.12.29 ~'07.4.27	462	연일건설㈜ 고경효	경쟁입찰	공사완료	“
제주하수처리장전기설비 긴급공사	VSS교체1대 ATS교체1대 VSS교체1대	‘06.08.11 ~08.25	24	제남전기 김영진	수의계약	공사완료	“
신제주펌프장 정비공사	L=36m 밸브식1식 울타리32경간	‘06.10.19 ~11.27	26	(주)명도건설 진정엽	경쟁입찰	공사완료	“
최종침전지 도장공사	최종침전지 7지 수로도장1식	‘06.10.18 ~‘07.01.19	41	현대건업(주) 좌봉택	견적입찰	공사완료	“
신제주펌프장 펌프정비공사	전기시설1식 펌프시설30hp 44개소	‘06.10.25 ~12.07	68	(주)현우전설 이차건	경쟁입찰	공사완료	“
중계펌프장및 간이펌프장 특수준설공사	준설44개소	‘06.11.09 ~12.18	40	태화건설(주) 오경환	경쟁입찰	공사완료	“
하수처리장 기계설비도장공사	기계설비 도장1식	‘06.12.05 ~12.26	47	신제주건설(주) 김한철	견적입찰	공사완료	“
지하수폐공 원상복구공사	지하수폐공 원상복구 9공	‘06.10.23 ~12.6	29	한국농촌공사 제주도본부	수의계약	공사완료	수자원 개발부

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
유수암리(장전공동 목장내) 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D125~15mm L = 2,494m	‘06. 8. 16 ～ 10. 25	106	(주)태원건설 양상원	제한경쟁	공사완료	제주지역사업소
월령리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D65~15mm L = 1,360m	‘06. 8. 24 ～ 10. 12	41	일영건설 장태식	견적입찰	공사완료	“
오광로 도평입구 외 10개소 노후관 교체공사	D=50~100㎜ L=1,920M	‘06. 9. 6 ～ 12. 14	51	성빈건설 장승택	견적입찰	공사완료	“
한라병원 동측 외 3개소 유량계 설치공사	유량계 설치 4개소	‘06. 10. 2 ～ 12. 30	63	세도건설 양병하	제한경쟁	공사완료	“
노후 및 불량수도 계량기 교체공사	D=15~40mm 794개소	‘06. 10. 4 ～ 11. 22	43	대양공영 조근홍	견적입찰	공사완료	“
용당리(주전동) 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D80~15mm L = 1,293m	‘06. 10. 11 ～ 11. 29	53	우창건설(주) 조정일	견적입찰	공사완료	“
06 시가지내 요철 제수변실 보수공사	요철제수변실인상 150개소	‘06. 10. 16 ～ 12. 14	43	전진토건 현태전	수의계약	공사완료	“
금등리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D100~15mm L = 3,695m	‘06. 10. 19 ～ 12. 17	115	남성토건 강성자	제한경쟁	공사완료	“
송당리(송당목장내) 상수도 이설공사	노후관 교체(PE) D125~50mm L = 2,227m	‘06. 10. 24 ～ 12. 12	88	무원건설 김상섭	제한경쟁	공사완료	“
이도2동～황사평간 배수관 시설공사	D=40~150㎜ L=1,798M	‘06. 10. 23 ～ 12. 21	195	신영건설 한미숙	제한경쟁	공사완료	“
북촌리(한사동) 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D80~15mm L = 1,549m	‘06. 10. 23 ～ 12. 11	63	자유건설 이호준	제한경쟁	공사완료	“
조천리(리사무소앞) 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D100~15mm L = 1,216m	‘06. 10. 25 ～ 12. 13	71	남성토건 강성자	제한경쟁	공사완료	“
동명리(지향동) 상수도 시설공사	노후관 교체(PE) D100~20mm L = 2,034m	‘06. 11. 6 ～ 12. 15	89	정연건설(주) 강호정	제한경쟁	공사완료	“
노후 및 불량수도 계량기 교체공사	D=15~40mm 736개소	‘06. 11. 15 ～ 12. 19	39	민경건설(주) 조덕천	견적입찰	공사완료	“
삼양동일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=25,749m	‘06. 8. 28 ~ 10. 24	66	한마음건설(주) 강종철	제한경쟁	공사완료	“
용담로타리 북서측외 시일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=27,933m	‘06. 10. 30 ~ 12. 18	67	성빈건설(주) 장승택	제한경쟁	공사완료	“
인화초등학교일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=12,677m	‘06. 12. 06 ~ 12. 22	45	성빈건설(주) 장승택	제한경쟁	공사완료	“
삼성혈외 시일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=12,156m	‘06. 12. 11 ~ 12 .22	34	성빈건설(주) 장승택	제한경쟁	공사완료	“
동여중 북측일원 하수도 정비공사	하수도 L=133m	‘06. 8. 30 ~ 9. 26	34	(주)상록개발 김만식	견적입찰	공사완료	“
신사수마을회관 주변 하수관 이설공사	하수도 L=56m	‘06. 12.. 11 ~ 12. 22	26	(주)아름종합건설 강경수	수의계약	공사완료	“
동광성당외 시일원 하수도 비굴착보수공사	하수도 L=526m	‘06. 11. 9 ~ 12. 20	74	용평건설(주) 박광준	수의계약	공사완료	“
도두동 오래물주변 하수관거 정비공사	하수도 L=371m	‘06. 11. 9 ~ 12. 20	141	남도건설 이영춘	제한경쟁	공사완료	“
사라봉주변 하수관거 정비공사	하수도 L=60m	‘06. 11. 9 ~ 12. 20	33	동아수도공업사 박탁웅	견적입찰	공사완료	“
세무서 사거리동측 하수관거 정비공사	하수도 125m	‘06. 11. 9 ~ 12. 20	49	풍진산업개발(주) 고희숙	견적입찰	공사완료	“
하수도 악취차단 빗물받이 구입	멀티그레이팅 300EA	‘06. 12. 3 ~ 12.26	31	(주)마이즈텍 김진호	수의계약	구입완료	“

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
동홍동 오일시장 남쪽 상수도 시설공사	상수도관 시설 L=1,391 D65mm	‘06.03.15. ~5.13.	39	(주)청명건설 홍상진	견적입찰	공사완료	서귀포지역사업소
천지동 여성회관 주변 상수도 노후관 교체	상수도 노후관 교체 L=603 D16~80mm	‘06.03.15. ~5.13.	35	민경건설(주) 조덕천	견적입찰	공사완료	“
강정동 말질로 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,245 D16~100mm	‘06.03.30. ~6.27.	28	영일건설 강복실	견적입찰	공사완료	“
중앙동 대동하로길 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=469 D16~100mm	‘06.04.04. ~5.28.	27	만흥건설(주) 강애숙	견적입찰	공사완료	“
색달1,2 지하수 송배수관 보수공사	송배수관 보수 송수관 650m, 배수관 430m	‘06.05.17. ~6.15.	31	(주)우림 권기형	견적입찰	공사완료	“
중앙동 중앙7로길 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=637 D16~100mm	‘06.05.26. ~6.24.	34	부성건설(주) 강우석	견적입찰	공사완료	“
성산읍 수산~오조간 상수도관 부설공사	상수도관 부설 L=2,154 D16~125mm	‘06.04.28. ~7.31.	54	(주)한성토건 김옥순	견적입찰	공사완료	“
남원읍 의귀리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,777 D16~50mm	‘06.04.28. ~7.26.	44	명부건설(주) 허명자	견적입찰	공사완료	“
대정읍 산이수동간 상수도관 부설공사	상수도관 부설 L=3,305 D16~150mm	‘06.03.02. ~6.29.	114	동방건설(주) 고민수	제한경쟁	공사완료	“
남원읍 신례1리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,465 D16~75mm	‘06.04.28. ~7.26.	53	(주)나라건설기계 오영훈	견적입찰	공사완료	“
표선면 세화리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,796 D16~75mm	‘06.04.28. ~7.26.	56	세진건설(주) 김효석	견적입찰	공사완료	“
남원읍 수망리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,376 D16~75mm	‘06.04.28. ~7.26.	54	한보건설(주) 조근배	견적입찰	공사완료	“
안덕면 동광리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,028 D16~75mm	‘06.05.04. ~8.01.	80	성지건설(주) 안정학	제한경쟁	공사완료	“
위미리 맹치동산 배수지 시설공사	배수지 50톤, L=660m D75~100mm	‘06.04.28. ~8.28.	86	(주)대록종합건설 송한봉	견적입찰	공사완료	“
회수마을회관 주변 상수도 노후관 교체	상수도 노후관 교체 L=2,007 D16~100mm	‘06.10.18. ~12.16.	44	주왕건설(주) 한석봉	수의계약	공사완료	“
웃법호촌 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,201 D20~50mm	‘06.10.19. ~12.17.	24	(주)웅진건설 송승천	수의계약	공사완료	“
태흥리(보국전) 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,812 D16~65mm	‘06.10.31. ~12.09.	43	청보토건(주) 김성휴	견적입찰	공사완료	“
표선리(중학교~소방서) 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,315 20~125mm	‘06.11.06. ~12.15.	39	법윤토건(주) 이윤철	견적입찰	공사완료	“
신산리(리사무소앞) 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,096 D16~75mm	‘06.11.01. ~12.10.	27	(주)승진건설 고연숙	견적입찰	공사완료	“
사계리 마을안 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,486 D16~75mm	‘06.11.10. ~12.19.	120	(주)부림토건 이경종	제한경쟁	공사완료	“
보목 마을회관 북쪽 상수도 노후관 교체	상수도 노후관 교체 L=1,711 D16~80mm	‘06.11.10. ~12.24.	52	석광건설(주) 김매순	견적입찰	공사완료	“
서홍동 명광가스 주변 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,809 16~100mm	‘06.11.10. ~12.24.	48	삼매건설(주) 김용중	견적입찰	공사완료	“
상효, 토평 상수도 배수관 연결공사	상수도 배수관 연결 L=1,515 16~100mm	‘06.11.10. ~12.24.	59	(주)웅진건설 송승천	견적입찰	공사완료	“
색달마을 서쪽 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,073 16~100mm	‘06.11.17. ~12.31.	94	우선개발 정시홍	제한경쟁	공사완료	“
화순리(가원동) 노후상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,304 D16~75mm	‘06.11.24. ~12.28.	28	(주)신천 최은호	견적입찰	공사완료	“

❏ 2007년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
어승생 송수관로 노후관 교체공사	D450㎜ 0.88㎞ D400㎜ 0.40㎞	‘07. 2. 7 ～7.12	244	(주)세상건설 김석봉	제한경쟁	공사완료	상수도 관리부
추자지하수개발공사	지하수 개발 2개소	‘07. 4. 6 ～10. 6	108	한국농촌공사 제주특별자치도본부장 이규복	수의계약	공사완료	“
우도 담수화증설 상수도관로 시설 공사	상수도관로 PE관 D 75, L=780m	‘07. 4. 19 ～5. 29	44	달마토건(주) 양홍기	견적입찰	공사완료	“
추자지하수이용시설공사	송수관로 6.2㎞ 양수장 2동	‘07. 4.20 ～11.30	640	(주)청우건설 고명오	제한경쟁	공사완료	“
추자지하수 수중모터펌프 설치공사	지하수개발 수중모터펌프(20HP):2대 제3저수지 담수화시설 연계공사	‘07. 9.14 ～12.23	217	제주수도개발 (주)장창덕	제한경쟁	공사완료	“
우도담수정수장 고압펌프교체 및 증설공사	고압펌프교체 2대 담수화시설증설 1,000→1,300톤	‘07.2.22 ～6.22	350	효성에바라 (주)김태경	제한경쟁	공사완료	“
수질검사실 고순도가스라인 시설공사	수질검사실 고순도가스라인 시설공사 1식	‘07.09.20 ~11.19	40	일천기계 송형남	견적입찰	공사완료	“
다항목 수질자동 계측기 구매 설치 공사	한림, 서림, 강정 정수장 각1식	‘07.06.12 ~08.01	54	(주)나노 하이텍 김대운	조달구매	공사완료	“
산천단배수지 시설공사	배수지 3,000톤 1지 유량계실 2개소 송배수관 D300m/m,L=474m 가압관 D150m/m,L=372m	‘07.6.04 ~04.29.	1,045	(주)제삼종합 건설 김경선	제한경쟁	공사완료	“
아라배수지~산천단배수지간송배수관 시설공사(가압장)	가압장(토목+건축)1식 관리사무실(건축)1식 송수관 D250m/m L=283m 오수관 D75m/m,L=260m	‘07.7.16 ~’08.5.10	339	(주)황룡종합 건설 고경록	제한경쟁	공사완료	“
함덕지구 광역상수도 연계공사	송수관로 D200m/m,L=1,740m	‘07.3.26 ~7.23	166	(주)세안건설 홍기철	제한경쟁	공사완료	“
북촌지구 광역상수도연계공사	송수관로 D150m/m,L=2,320m	‘07.3.14 ~8.10	158	(주)삼매건설 김용중	제한경쟁	공사완료	“
상효~하효지구 광역상수도연계공사	배수관로 D200m/m,L=654m D100m/m,L=654m	‘07.2.21 ~8.19	82	(주)청도종합 건설 고경도	제한경쟁	공사완료	“
상효~신효지구 광역상수도연계공사	배수관로 D200m/m,L=510m	‘07.6.5 ~11.1	56	(주)청보토건 김성휴	견적입찰	공사완료	“
의귀지구 광역상수도 연계공사	배수관로 D150m/m,L=1,220m	‘07.6.11 ~12.7	140	(주)서부건설 이영익	제한경쟁	공사완료	“
어승생 Y계곡취수원 제11호(나리)태풍피해 응급복구공사	취수관로 연결 강관비계틀 설치	‘07.9.21 ～9.28	29	신천공무사 최익환	수의계약	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
아라가압장 통신설비 인입공사	아라가압장통신설비 인입공사1식	‘07.8.17 ～‘08.3.16	22	한라전설(주) 현문철	견적입찰	공사완료	상수도 관리부
아라가압장 전기 인입공사	전기인입(600KVA) 시설 1식 전기인입(60KVA) 시설 1식	‘07.7.16 ～‘08.5.22	98	지형전기(주) 강한섭	제한경쟁	공사완료	“
한림정수장 취수펌프 전기인입선로 교체공사	전기인입선로 교체 1식	‘07.3.9 ~4.5	29	동화전기공사 송방민	견적입찰	공사완료	“
수자원본부 IP교환기 구매설치공사	IP교환기정류기반 밧데리반설치 1식	‘07.3.27 ~5.14	52	일신전기 통신공사 오도일	제한경쟁	공사완료	“
광역정수장 운영실제어용 중앙서버교체공사	정수장운영실 제어용 서버교체 3개소	‘07.5.7 ~6.11	58	삼성전기 진호남	제한경쟁	공사완료	“
한림가압장 무인자동운전 제어반 제작설치공사	현장제어반 22.9Kv메인반 3.3kv메인반 제작설치	‘07.5.25 ~7.13	90	협신기전 양규식	제한경쟁	공사완료	“
추자 지하수관정 전기 내선공사	추자신양리지하수관정전기내선공사:1식	‘07.10.02 ~12.20.	82	(주)화신 이경호	제한경쟁	공사완료	“
한림정수장 불소 자동시스템 교체 공사	불소자동시스템 교체 1식	‘07.10.11 ~11.22.	42	협신기전 양규식	제한경쟁	공사완료	“
아라가압장 수,배전반 제작 설치 공사	수배전반 제작설치 1식	‘07.10.11. ~‘08.03.31.	248	협신기전 양규식	제한경쟁	공사완료	“
신효지구 광역상수도 연계공사	PEP피복강관 부설(D200㎜), 630m	07.10.31. ~‘08.3.28.	64	(주)성림개발원 고금순	제한경쟁	공사완료	“
추자도 식수원 개발사업(묵리 복류수 이용)공사	저류조(유효수량 500톤) 1개소 저류조(유효수량 500톤) 1개소 (400*450), 27m	07.11.12. ~‘08.7.21.	297	법윤토건(주) 이윤철	제한경쟁	공사완료	“
행원1수원 전기시설 호우피해 복구 공사	수배전반 정비 :1식 지하수기동반 정비:1식	07.11.23 ~11.30.	22	(주)정우전력 이관우	수의계약	공사완료	“
동광양가압장 전기시설 태풍피해 긴급 복구공사	동광양가압장 수배전반 긴급복구 1식	07.12.03. ~‘08.1.02.	25	(주)정우전력 이관우	수의계약	공사완료	“
광역삼양수원지 나리 태풍피해 복구공사	콘크리트 포장(L=120m, B=4.0m) 울타리시설(능형망휀스W2.0*H2.5m) 49경간 전석쌓기(0.5㎥급) 203㎡	07.12.03. ~‘08.1.14.	43	아셈건설(주) 문승필	견적입찰	공사완료	“
강정정수장 수문 태풍피해 복구 공사	강정정수장 수문 태풍피해 복구 2개소	07.12.05. ~‘08.1.29.	55	(주)지안건설 김인행	견적입찰	공사완료	“
외도수원지 사무실 및 관리사 태풍피해 복구공사	외도수원지 사무실 1동 태풍피해 복구 1식 외도수원지 관리사 4동 태풍피해 복구 1식	‘07.12.06. ~12.26.	42	(주)부성이엔씨 이석우	견적입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
삼양3수원지외 3개소 셔터문 태풍피해 복구 공사	삼양3수원지 외 3개소 셔터문 태풍피해 복구	‘07.12.11 ~‘08.1.10	33	(주)제주드림 백남식	견적입찰	공사완료	상수도 관리부
강정정수장 태풍나리 피해복구공사	석축찰 쌓기(30*30*35㎝) 400㎡ 상수원보호구역 경계휀스시설(W2.0*H2.0m) 취수원하상준설2,100㎥	‘07.12.20 ~‘08.03.18	234	(주)만진건설 윤춘철	제한경쟁	공사완료	“
연동 지하수위 관측정 태풍피해 복구 공사	시추조사 : 시추심도 132m, 시추구경 400~250 정호구경 200㎜ 밀폐식 상부보호공 설치 (관측공용)	‘07.12.20 ~‘08.3.19	69	청화산업개발 변대중	견적입찰	공사완료	“
지하수위(구좌4외 3개소) 관측정 태풍피해 복구공사	지하수위 관측정 시설개수 (양수장 건물 철거 및 울타리 설치 등) 밀폐식 상부보호공 설치(관측공용)	‘07.12.20 ~‘08.3.19	65	승림건설 이경희	견적입찰	공사완료	“
아라가압장 가압시설 설치공사	가압모터펌프(150HP/2.1㎥/min/232m)제작	‘07.12.20 ~‘08.2.18	228	삼매건설(주) 김용중	제한경쟁	공사완료	“
조천정수장 외 6개소 CCTV태풍피해 복구 공사	조천정수장 CCTV 태풍피해 복구 외 6건	‘07.12.24 ~‘08.2.22	96	한라전설 현문찬	제한경쟁	공사완료	“
제11호 태풍 나리 내습에 따른 어승생수원피해 복구 사업	-취수원 하상준설: 3,750㎥(제1수원 3,390,제2수원 360) - 도수로 복구 : VR관(800mm), L=166m -옹벽 L= 122m -전석쌓기 :L=2,472m -저수지 퇴수로 개량: L=59m -도수로 교체:VR관 (1000mm)L= 185m	‘08.1.4 ~‘08.11.7	1,680	신도종합건설 문기호	제한경쟁	공사완료	“
어승생수원 정수처리시설 제작 구매설치	통상여과기 구입 1식	‘07.4.23 ~7.26	171	한국기계공업협동조합 한승일	조달구입	설치완료	“
어승생 저수지 도수로 유량계 제작 구매설치	도수로용 초음파 유량계 제작구매 1식	‘07.5.18 ~8.10	28	한성전기주식회사 정은경	견적입찰	설치완료	“
한림가압장 무인자동운전제어반 제작설치	현장제어반 제작설치 22.9KV메인반 정비 3.3KV메인반 정비	‘07.5.25 ~7.13	89	협신기전 양규식	제한경쟁	설치완료	“
월산정수장외11개소 수질모니터링시스템 구축제작설치	월산정수장외11개소 수질모니터링시스템구축	07.6.21 ~10.18	143	(주)대원계전산업 정광자	제한경쟁	설치완료	“
아라가압장 자동제어반 제작 설치	아라가압장 자동제어반 제작설치 1식	‘07.8.3 ~‘08.6.2	238	한성전기주식회사 정은경	제한경쟁	설치완료	“
광역정수장 노후자동화설비 교체	밧데리교체설치(UPS용):14개소 밧데리교체설치(조작반용):8개소 밧데리교체설치(운영실용):3개소	‘07.8.27 ~10.24	115	(주)대원계전산업 정광자	제한경쟁	설치완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
용흥가압장 무인자동운전 제어반 제작설치	무인자동운전 제어반 제작설치	‘07.9.7 ~11.5	105	협신기전 양규식	제한경쟁	설치완료	상수도 관리부
아라가압장 CCTV 제작 구매설치	CCTV 제작 구매설치 2개소	‘07.11.13 ~‘08.4.11	106	남양정보통신 전계숙	제한경쟁	설치완료	“
강정정수장 태풍피해 취수펌프 배전반 제작 구입	취수펌프 배전반 4면 제작구입설치 1식	‘07.12.24 ~‘08.2.13	48	대은계전 강미영	제한경쟁	구입완료	“
조천정수장 외 12개소 태풍피해 복구용 유량계 구입	초음파 유량계(400 ~700㎜)구입교체 23개소 전자식유량계(150㎜) 구입교체 9개소 윌트망식유량계(100㎜)구입교체 1개소	‘07.12.24 ~‘08.3.27	431	윈텍 이효주	지명경쟁	구입완료	“
외도수원지 태풍피해 고압 수배전반 제작구입	외도수원지 태풍피해 복구용 고압수,배전반	‘07.12.24 ~‘08.3.31	160	(주)대원계전산업 정광자	제한경쟁	구입완료	“
동광양가압장 태풍피해 복구용 고압수배전반 제작구입	고압, 수, 배전반 제작 구입 설치 4면	‘07.12.26 ~‘08.2.13	67	한성전기주식회사 정은경	제한경쟁	구입완료	“
삼양1,2수원지 태풍피해 복구용 고압수배전반 제작구입	고압 수,배전반 제작 구입 설치 14면	‘07.12.26 ~‘08.4.1	268	한성전기주식회사 정은경	제한경쟁	구입완료	“
예비용 수중모터펌프 제작구입	수중모터펌프 (380V/60HP/280m/960톤)외 16대	‘07.10.18 ~12.7	202	대한장애인복지회 배춘섭	수의계약	구입완료	“
광역상수관로 연계공사(남원지구)	농어촌 생활용수 개발 사업 배수지 800㎥1지 관로 4.7km	‘07.03.21 ~’08.01.	1,118	한양종합건설(주) 김춘희	제한경쟁	공사완료	수자원 개발부
조천지구 광역상수관로 연계공사	배수지 V=3,000㎥ 송․배수관로 L=2,068m	‘07.11.12 ～‘08.11.11	1,430	장원종합건설(주) 한상철	제한경쟁	추진중 (95%)	“
조천지구 광역상수관로 연계공사 계측기기 제작 설치 공사	수위전송반(TM) 제작 설치 1식 조천정수장(TM)개조 1식	‘07.11.22 ~‘08.10.21	39	삼원산업 이준호	견적입찰	공사완료	“
회수지구하수관거 정비사업(2차분)	L=1.6km	'07.03.09 ~09.08	360	에덴종합건설(주) 김택신	경쟁입찰	공사완료	하수도 관리부
서귀포시 동지역 하수관 준설공사	하수관준설 V=1,500㎥	'07.04.18 ~12.17	204	(주)한마음건설 강종철	경쟁입찰	공사완료	“
상예ㆍ우남지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=2.2km	'07.06.01 ~'08.01.31	1,009	지성종합건설(주) 임지택	경쟁입찰	공사완료	“
예래ㆍ중동지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=2.1km	'07.06.01 ~'08.01.31	1,192	흥남종합건설(주) 김원하	경쟁입찰	공사완료	“
색달지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=1.5km	'07.05.25 ~12.24	698	동마종합건설(주) 강창수	경쟁입찰	공사완료	“
서호ㆍ호근지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=3.9km	'07.05.28 ~'08.02.28	1,792	유성건설(주) 김영철	경쟁입찰	공사완료	“
토평지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=2.7km	'07.05.28 ~'08.02.28	1,990	유성건설(주) 김영철	경쟁입찰	공사완료	“
법호촌지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=1.0km	'07.05.21 ~12.20	511	형주종합건설(주) 김형삼	경쟁입찰	공사완료	“
동상효지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=3.4km	'07.05.29 ~'08.1.28	1,401	한양종합건설(주) 김춘희	경쟁입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
월평동 하수도 정비공사	하수관거 L=0.1km	'07.06.20 ~09.19	50	(주)세안건설 홍기철	경쟁입찰	공사완료	하수도 관리부
신시가지하수관거 정비공사	하수관거 L=1.2km	'07.09.21 ~'08.02.17	262	제복건설(주) 고미순	경쟁입찰	공사완료	“
토평지구하수관거 정비사업	하수관거 L=1.1km	'07.09.21 ~'08.02.20	459	청호환경건설(주) 이정언	경쟁입찰	공사완료	“
호근지구하수관거 정비사업	하수관거 L=0.4km	'07.09.28 ~'08.2.27	167	삼원건설(주) 윤병운	경쟁입찰	공사완료	“
보목지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=0.7km	'07.10.16 ~'08.02.15	364	산방종합건설 주미경	경쟁입찰	공사완료	“
하효지구 하수관거 정비사업(1차분)	하수관거 L=0.6km	'07.10.17 ~'08.02.16	176	광개토개발 임동욱	경쟁입찰	공사완료	“
도순앞동산길 하수관거 시설공사	하수관거 L=0.4km	'07.10.31 ~ '08.02.07	82	(주)제남건설 김영진	경쟁입찰	공사완료	“
효돈동(쇠소깍)지구 하수관거 정비공사	하수관거 L=0.3km	‘07.11.19 ~‘08.02.28	158	영성토건(주) 김영순	경쟁입찰	공사완료	“
동홍동(굴왓모루길) 하수관거 시설공사	하수관거 L=0.6km	‘07.12.20 ~‘08.05.17	125	(주)성원 안재형	경쟁입찰	공사완료	“
걸매생태공원 하수관거 시설공사	하수관거 L=0.3km	‘07.12.20 ~‘08.05.15	88	동신엔지니어링 김한규	경쟁입찰	공사완료	“
효돈번영로 하수관거 시설공사	하수관거 L=1.5km	‘07.12.18 ~‘08.10.17	1,517	(주)대웅건설 김태문	경쟁입찰	공사완료	“
도순석송로주변 하수관거 시설공사	하수관거 L=0.2km	‘07.12.24 ~‘08.02.11	27	민경건설 조덕천	견적입찰	공사완료	“
대정1공구하수관거 정비시설공사(4차분)	하수관거 L= 2.4Km	‘07.02.27 ~12.26	1,035	영진종합건설 한영선	경쟁입찰	공사완료	“
대정2공구하수관거 정비시설공사(4차분)	하수관거 L= 6.8Km	‘07.02.27 ~12.26	2,276	신도종합건설 문기호	경쟁입찰	공사완료	“
안덕1공구하수관거 정비시설공사(4차분)	하수관거 L= 7.0Km	‘07.02.27 ~12.26	1,900	장원종합건설 한상철	경쟁입찰	공사완료	“
안덕2공구하수관거 정비시설공사(4차분)	하수관거 L= 2.6Km	‘07.02.27 ~12.26	476	영륭종합건설 김영호	경쟁입찰	공사완료	“
성산1공구하수관거 정비시설공사(4차분)	하수관거 L= 4.0Km	‘07.02.27 ~12.31	968	영륭종합건설 김영호	경쟁입찰	공사완료	“
성산2공구하수관거 정비시설공사(4차분)	하수관거 L= 4.6Km	‘07.02.27 ~12.31	1,823	부건종합건설 김용덕	경쟁입찰	공사완료	“
난산처리분구하수 관거정비시설공사	하수관거 L= 5.7Km	‘07.04.25 ~’08.2.18	1,523	서진종합건설 부영권	경쟁입찰	공사완료	“
산이수동하수관거 정비시설공사	하수관거 L= 0.9Km	‘07.07.27 ~’07.12.26	235	화성건설(주) 성길훈	경쟁입찰	공사완료	“
무릉평지동 농어촌 마을하수도 개량공사	L=616m	‘07.08.07 ～’07.12.6	277	대박건설(주) 박 성 준	경쟁입찰	공사완료	“
서광서리 농어촌 마을하수도 개량공사	L=734m	‘07.08.09 ～’07.12.8	223	세경건설(주) 오 영 남	경쟁입찰	공사완료	“
가시역지동 농어촌 마을하수도 개량공사	L=815m	‘07.08.09 ～’07.12.5	232	태조건설(주) 강 영 미	경쟁입찰	공사완료	“
삼달2처리분구하수 관거정비시설공사	하수관거 L= 1.9Km	‘07.09.03 ~’08.2.22	485	(주)세도건설 양병하	경쟁입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
서광동리 농어촌 마을하수도설치공사	하수관거 L= 646m	‘07.12.10 ~’08.01.15	201	신산종합건설(주) 문덕진 (주)대림개발 오동헌	경쟁입찰	공사완료	하수도 관리부
연동지역 분류식 하수관거 정비공사(5차)	PE관 부설 L=4,007m	‘07.06.28 ~’08.1.27	1,702	(주)신광 종합건설 임문건	경쟁입찰	공사완료	“
봉개반석아파트 주변 우수관 확장공사	흄관 L=250M	'07.06.18 ~'07.08.28	74	희성건설(주) 홍장표	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(1공구)	신설 L=20,249m 교체L=470m 보수 L=230m 부분 248개소외	'07.08.24 ~'10.08.23	12,520	흥남종합 건설(주) 김원하	경쟁입찰	추진중 (49%)	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(2공구)	신설 L=25,912m 교체L=209m 보수L=35m 부분209개소외	'07.08.23 ~'10.08.22	13,524	(주)대웅 건설 김태문	경쟁입찰	추진중 (49%)	“
추자 묵리 농어촌 주거환경 개선공사	오수처리시설 1식	‘07.11.13 ~‘08.02.25	690	성지건설 개발(주) 백창효	경쟁입찰	공사완료	“
대흘2리 오수처리시설 개량공사	개량 1식	‘07.11.29 ~‘08.02.25	94	신광환경 개발 양정배	경쟁입찰	공사완료	“
동복리 농어촌마을하수도 개선공사	오수관거 L=418m	‘07.11.29 ~‘08.02.21	83	부원건설(주) 김상섭	경쟁입찰	공사완료	“
송당리 오수처리시설 개량공사	개량 1식	‘07.11.29 ~‘08.02.25	68	(주)태승건설 고원춘	경쟁입찰	공사완료	“
선흘2리 오수처리시설 개량공사	개량 1식	‘07.11.30 ~‘080.2.25	53	(주)한라정화개발 임세택	경쟁입찰	공사완료	“
월림리 농어촌 주거환경개선공사	개량 1식	‘07.11.29 ~‘08.02.25	86	(주)유성엔지니어링 김원중	경쟁입찰	공사완료	“
유수암리 오수처리시설 개량공사	개량 1식	‘07.11.29 ~‘08.02.25	57	(주)태승건설 고원춘	경쟁입찰	공사완료	“
수산리 오수처리시설 개선공사	개량 1식	‘07.11.29 ~‘08.02.25	82	(주)경원산업 손유원	경쟁입찰	공사완료	“
구좌지역 간이펌프장 전기판넬 복구공사	전기판넬 복구 1식	‘07.12.10 ~‘08.01.10	35	(주)효성전력 김춘범	수의계약	공사완료	“
조천지역 간이펌프장 전기판넬 복구공사	전기 판넬복구 1식	‘07.12.10 ~‘08.01.10	44	(주)효성전력 김춘범	수의계약	공사완료	“
삼수천 하류부 하수관거 태풍나리 피해복구공사	오수관 교체 L=95m 등	‘07.12.11 ‘08.01.09	63	(주)신광종합 건설 임문건	수의계약	공사완료	“
제주시 영평동 성산교회 오수관로 태풍 나리피해복구공사	오수관 복구 L=370m등	‘07.12.10 ~12.27	101	태웅종합 건설(주) 강태범	수의계약	공사완료	“
조천지역 간이펌프장 통합제어판넬 복구공사	통합제어시스템 수리 1식	‘07.12.12 ~‘08.01.25	35	(주)광명전기 이재광	수의계약	공사완료	“
제주시 읍면지역 하수도 흡입준설공사	흡입준설 L=30.862m	‘07.12.21 ~‘08.01.28	86	대명건설(주) 고태관	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 읍면지역(한장동일원)하수관거 정비공사	하수관거 정비 L=485m	'07.12.18 ~'08.02.22	120	신일토건 고경봉	경쟁입찰	공사완료	“
우도 천진리 농어촌 주거환경개선공사	개량 1개소 관거 L=730m	‘07.12.28 ~‘08.06.27	444	태승산업개발(주) 강경호	경쟁입찰	공사완료	“
보목하수종말처리장 고도처리시설설치공사	고도처리 20,000㎥/일	‘07.01.24 ~6.23	517	효성에바라 엔지니어링 기문봉	수의계약	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
동부하수종말처리장 고도처리시설전기공사	전기공사	‘07.01.24 ∼06.23	46	청우에스코(주) 신경훈	견적입찰	공사완료	하수도 관리부
화북중계펌프장 증축공사	발전기실 증축 50㎡	‘07.06.20 ~.09.10	37	진선종합건설 김홍륜	견적입찰	공사완료	“
병문중계펌프장 증축공사	발전기실및전기실증 개축153㎡	‘07.06.28 ~11.22	155	영보종합건설 진성진	경쟁입찰	공사완료	“
병문중계펌프장 비상용발전기 및 예비 전기설비 설치공사	발전기설치 1식	‘07.07.13 ~12.09	90	협성전기 장연선	경쟁입찰	공사완료	“
중계펌프장 비상발전기 및 예비전기설비 공사	발전기 2대	‘07.08.13 ~12.13	52	세기건설(주) 양문석	경쟁입찰	공사완료	“
색달처리장및중계펌프장전등, 정열교체공사	전등전열 교체 1식	‘07.12.27 ~‘08.01.20	45	(주)원남 신현봉	경쟁입찰	공사완료	“
색달하수처리장 유량조정조 시설공사	유량조정조	‘07.12.21 ~‘08.12.20	909	성창종합건설 양성문	경쟁입찰	추진중 (90%)	“
화북펌프장 수중모터펌프구입	모터펌프	‘07.03.20 ~05.17	49	삼진공업 이윤호	수의계약	구입완료	“
간이펌프장 예비수중 펌프구입	펌프 23대	‘07.04.09 ~06.07	48	명신기계 이광옥	수의계약	구입완료	“
간이펌프장 예비수중 펌프구입	펌프 15대	‘07.04.16 ~06.14	27	장우정밀 정경대	수의계약	구입완료	“
중문동부펌프장 수중펌프구입	펌프	‘07.05.17 ~07.15	66	금정공업(주) 양태열	수의계약	구입완료	“
병문중계펌프장 비상용발전기 제작	발전기	‘07.07.13 ~11.24	154	(주)이스트파워 신성호	경쟁입찰	구입완료	“
중문동부펌프장계장제어장치(이중화설비)구매설치	계장제어장치	‘07.07.18 ~10.12	51	(주)대은계전 고휴환	경쟁입찰	설치완료	“
화북중계펌프장motor 기동반 제작	모터기동반	‘07.07.18 ~11.14	139	(주)세명전기 유연성	경쟁입찰	설치완료	“
병문중계펌프장motor 기동반 제작	모터기동반	‘07.07.19 ~11.15	163	엘지전자 김경탁	경쟁입찰	설치완료	“
중계펌프장 수배전반 및 모터기동반 제작	모터기동반	‘07.08.27 ~11.23	78	(주)대은계전 고휴환	경쟁입찰	설치완료	“
도두펌프장 수중펌프제작구입	수중펌프	‘07.09.14 ~11.09	77	삼진공업 이윤호	수의계약	설치완료	“
색달처리장 계장제어장치 (이중화설비)구매	계장제어장치	‘07.10.16 ~‘08.01.14	155	(주)대은계전 고휴환	경쟁입찰	구입완료	“
병문펌프장 태풍(나리)피해복구 특고압수배전반 제작	특고압수밴전반	‘07.11.09 ~12.20	253	한성전기 정은경	경쟁입찰	설치완료	“
제주시하수처리장 자외선램프구입	자외선램프	‘07.11.12 ~12.18	49	(주)선일엔 바이로 정용식	견적입찰	구입완료	“
병문중계펌프장 태풍나리 피해복구 자동제어반제작	자동제어반	‘07.11.15 ~12.24	198	엘지전자 김경탁	수의계약	설치완료	“
병문펌프장 입축사류펌프제작구입 및 설치	입축사류펌프	‘07.12.28 ~08.03.27	167	세일기계공업 하재범	경쟁입찰	설치완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
한경면 한원리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D125~15mm L = 7,015m	‘07. 2. 22 ～ 5. 22	181	금오건설(주) 강용진	제한경쟁	공사완료	제주지역사업소
애월읍 신엄리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D125~15mm L = 6,787m	‘07. 2. 28 ～ 5. 28	212	삼매건설(주) 김용중	제한경쟁	공사완료	“
이호 남양교통 골목 외 7개소 노후관 교체공사	D=20~50㎜ L=846M	‘07. 4. 2 ～ 6. 7	44	풍진산업 개발(주) 고희숙	견적입찰	공사완료	“
이호해수욕장 배수관 확장공사	D=150㎜ L=270M	‘07. 4. 17 ～ 6. 18	28	신성건설(주) 변규암	견적입찰	공사완료	“
구.세무서 서측 외 1개소 노후관 교체 공사	D=50~80㎜ L=1,054M	4. 18 ～ 7. 9	37	(주)대흥건설 진성호	견적입찰	공사완료	“
애월읍 신엄리(성도그린) 상수도 확장공사	상수도 확장 주철관 D100mm L = 42m PE관 D100~65mm L = 1,290m	‘07. 4. 19 ～ 5. 18	50	영덕건설 정문팽	견적입찰	공사완료	“
오라동 오라로타리 서측 배수관 시설공사	D=50~300㎜ L=1,508M	‘07. 4. 19 ～ 8. 21	224	(주)기흥건설 장봉문	제한경쟁	공사완료	“
노형동 광평마을 남측 배수관 확장공사	D=100~150㎜ L=1,248M	‘07. 4. 25 ～ 8. 2	112	백상건설(주) 임성철	제한경쟁	공사완료	“
일도2동 미화아파트 앞 노후관 교체공사	D=50㎜ L=300M	‘07. 4. 27 ～ 6. 21	33	(주)정도건설 서희윤	수의계약	공사완료	“
한림읍 명월리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체 주철관 D100mm L = 48m PE관 D100~15mm L = 3,888m	‘07. 4. 30 ～ 6. 18	132	늘푸른건설(주) 오창환	제한경쟁	공사완료	“
아라동 대원마을 노후관 교체공사	D=25~80㎜ L=3,116M	‘07. 5. 4 ～ 8. 30	144	(주)한마음건설 강종철	제한경쟁	공사완료	“
조천읍 신촌리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D100~15mm L = 5,970m	‘07. 5. 14 ～ 8. 9	206	(주)강진건설 오택부	제한경쟁	공사완료	“
노형 뉴월드마트 북측 주변 노후관 교체공사	D=50~150㎜ L=1,956M	‘07. 5. 16 ～ 10. 11	217	제복건설(주) 고미순	제한경쟁	공사완료	“
애월읍 금성리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D125~15mm L = 9,149m	‘07. 5. 16 ～ 8. 9	275	성덕건설 나종용	제한경쟁	공사완료	“
노형 E마트 동측 주변 노후관 교체공사	D=50~150㎜ L=2,874M	‘07. 6. 1 ～ 9. 20	283	(주)성민건설 오태성	제한경쟁	공사완료	“
구좌읍 하도리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D100~15mm L = 3,714m	‘07. 6. 7 ～ 7. 26	82	신오건설(주) 우철호	제한경쟁	공사완료	“
2007년 시가지내 요철 제수변실 보수공사	요철제수변실인상 203개소	‘07. 6. 13 ～ 9. 3	58	전진토건 현태전	수의계약	공사완료	“
한림읍 귀덕2리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D65~15mm L = 1,051m	‘07. 6. 18 ～ 7. 16	26	석광건설(주) 김매순	견적입찰	공사완료	“
우도면 서광리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D65~15mm L = 990m	‘07. 6. 15 ～ 7. 24	47	정완토건(주) 안승규	견적입찰	공사완료	“
연동 연오로 배수관 시설공사	D=80㎜ L=480M	‘07. 6. 29 ～ 8. 17	20	세진건설(주) 김효석	견적입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
애월읍 금성,곽지 지구 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D15mm~125mm L=1,834m	‘07. 12. 17 ～ ‘08.2.14	84	청호환경건설 이정언	제한경쟁	공사완료	제주지역사업소
화북2동 황세왓 배수지 북측길 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D20mm~75mm L=1,020m	‘07. 12. 17 ～ ‘08.1.30	27	조일건설(주) 강임옥	견적입찰	공사완료	“
오등난지연구소 주변 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D50mm~150mm L=1,534m	‘07. 12. 18 ～ ‘08.3.6	61	(주)신천 최은호	견적입찰	공사완료	“
애월읍 어음,봉성 지구 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D15mm~100mm L=806m 감압변설치 1식	‘07. 12. 19 ～ ‘08.1.17	32	주왕건설(주) 강권희	견적입찰	공사완료	“
정실6호 고다시간 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D100mm L=2,630m	‘07. 12. 24 ～ ‘08.4.1	20	세진건설(주) 김효석	견적입찰	공사완료	“
동문로타리 동측일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=25,206m	‘07. 4. 24 ~ 6. 12	67	태화건설(주) 오경환	제한경쟁	공사완료	“
제주시청 서측외 시일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=27,545m	‘07. 6. 18 ~ 8. 6	67	성빈건설(주) 장승택	제한경쟁	공사완료	“
적십자회관 동측일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=30,951m	‘07. 7. 16 ~ 9. 3	65	(주)백록개발 이춘식	제한경쟁	공사완료	“
관덕정일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=22,732m	‘07. 7. 13 ~ 8. 31	66	(주)동신엔지니어링 김한규	제한경쟁	공사완료	“
구서중학교일원 하수도 흡입준설공사	하수도 흡입준설 L=28,072m	‘07. 10. 2 ~ 11. 17	66	성빈건설(주) 장승택	제한경쟁	공사완료	“
용담킹마트 남측 하수도 정비공사	하수도 L=115.5m	‘07. 5. 25 ~ 7. 23	34	정완토건(주) 안종규	견적입찰	공사완료	“
화북주공아파트 북서측 하수도 정비공사	하수도 L=461m	‘07. 7. 10 ~ 10. 13	164	(주)정연건설 장태식	제한경쟁	공사완료	“
신제주순복음교회 남측 하수도 정비공사	하수도 L=770m	‘07. 7. 11 ~ 10. 16	257	일영건설 강호정	제한경쟁	공사완료	“
노형대림아파트 동측 하수관거 정비공사	하수도 L=115m	‘07. 9. 27 ~ 11. 15	39	(주)첼린저 오철성	견적입찰	공사완료	“
동여중동측 하수도 비굴착 부분보수공사	하수도 L=100m	‘07. 4. 30 ~ 5. 29	33	(주)용평건설 박광준	수의계약	공사완료	“
용담로타리 서측외 시일원 불량맨홀 정비공사	맨홀정비 60EA	‘07. 6. 5 ~ 7. 3	41	전진토건 현태전	수의계약	공사완료	“
영락교회 서측 하수도 비굴착부분 보수공사	하수도 L=551m	‘07. 9. 10 ~ 10. 29	76	(주)용평건설 김정현	수의계약	공사완료	“
용담한양아트빌라 앞 하수관거 정비공사	하수도 L=81m	‘07. 9. 13 ~ 10.12	22	(주)청우건설 고명오	견적입찰	공사완료	“
8호광장 동측 하수도 정비공사	하수도 L=130m	‘07. 9. 20 ~ 10. 18	27	(주)명품건설 강완종	견적입찰	공사완료	“
터미널북측일원 하수도흡입준설공사	하수도흡입준설 L=26,388m	‘07. 11. 7 ~ 11. 24	68	(주)조일건설 강임옥	제한경쟁	공사완료	“
중소기업센터 및 신천지아파트일원 하수도 비굴착보수공사	하수도 L=1,267m	‘07. 11. 13 ~ 12. 27	82	(주)용평건설 김정현	수의계약	공사완료	“
이도주공아파트 동측 하수도 흡입준설공사	하수도흡입준설 L=31,143m	‘07. 11. 19 ~ 12. 24	68	(주)한마음건설 강종철	제한경쟁	공사완료	“
거북이주유소앞외 시일원 불량맨홀정비공사	맨홀정비 106개소	‘07. 11. 19 ~ 12. 26	75	전진토건 현태전	수의계약	공사완료	“
오일시장 서측일원 하수도 보수공사	하수도 L=481.5m	‘07. 11 .26 ~ 12. 28	146	수석건설(주) 변길용	제한경쟁	공사완료	“
황사평 마을회관앞 하수도 정비공사	하수도 L=351m	‘07. 11. 16 ~ 12. 27	195	진도건설(주) 오종암	제한경쟁	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
삼도1동 중앙여중 북측 주변 노후관 교체공사	D=25~80㎜ L=1,629M	‘07. 7. 2 ～ 10. 4	116	(주)대흥건설 진성호	제한경쟁	공사완료	제주지역사업소
삼도1동 전농로, 서사로 노후관 교체공사	D=25~100㎜ L=3,024M	‘07. 7. 2 ～ 10. 29	193	유창기업 박광조	제한경쟁	공사완료	“
구좌읍 동복리 급수관 신설공사	급수관 신설(PE) D100mm L = 1,905m	‘07. 7. 4 ～ 8. 2	65	영일건설(주) 강복실	제한경쟁	공사완료	“
삼도1동사무소 앞 노후관 교체공사	D=50~80㎜ L=287M	‘07. 7. 12 ～ 10. 23	29	동신건설(주) 양성하	견적입찰	공사완료	“
조천읍 함덕리 급수취약지 상수도 관 신설공사	상수도관 신설(PE) D75~15mm L = 854m	‘07. 7. 16 ～ 8. 13	23	명문건설 문명협	견적입찰	공사완료	“
구좌읍 상덕천 급수관 신설공사	급수관 신설(교체) (PE) D75~15mm L = 2,559m	‘07. 7. 20 ～ 8. 18	78	늘푸른건설(주) 오창환	제한경쟁	공사완료	“
구좌읍 평대리 중동 마을안 상수도 노후 관 교체공사	노후관 교체(PE) D100~15mm L = 4,600m	‘07. 8. 2 ～ 10. 10	111	진영토건 김영종	제한경쟁	공사완료	“
용강 마을회관 남측 노후관 교체공사	D=80㎜ L=544M	‘07. 8. 10 ～ 10. 19	56	(주)유강이앤씨 김창언 외 1	견적입찰	공사완료	“
조천읍 선흘1리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D100~15mm L = 6,719m	‘07. 8. 13 ～ 11. 8	227	(주)승진건설 고연숙	제한경쟁	공사완료	“
도련1동 마을회관 동측 주변 노후관 교체공사	D=25~80㎜ L=1,024M	‘07. 8. 28 ～ 10. 16	47	청보토건(주) 김성휴	견적입찰	공사완료	“
아라동 아연로 주변 노후관 교체공사	D=40~150㎜ L=2,748M	‘07. 9. 14 ～ 12. 21	271	소양건설(주) 소원옥	제한경쟁	공사완료	“
외도동 신산마을 노후관 교체공사	D=25~150㎜ L=4,254M	‘07. 9. 14 ～ 12. 24	282	청오건설(주) 강창성	제한경쟁	공사완료	“
한경면 산양리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D100~15mm L = 9,705m	‘07. 9. 27 ～ 12. 24	324	주왕건설(주) 강권희	제한경쟁	공사완료	“
한리읍 상대리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체 D15mm~200mm L=7,901m	‘07. 10. 18 ~ 12. 20	305	규성개발(주) 전형택	제한경쟁	공사완료	“
봉개동 삼봉로 주변 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체 D20mm~100mm L=2,100m	‘07. 11. 13 ～ 12. 24	74	석광건설(주) 김매순	제한경쟁	공사완료	“
아라1동 사또농장 주변 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D20mm~50mm L=950m	‘07. 12. 12 ～ ‘08.1.25	22	삼육건설(주) 김성수	견적입찰	공사완료	“
아라동 제주어린이집 상수도관 태풍 피해 복구공사	상수도관복구 D20mm~75mm L=1,415m	‘07. 12. 14 ～ ‘08.2.11	54	명부건설(주) 허명자	견적입찰	공사완료	“
서회천 안보미길 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D20mm~50mm L=1,182m	‘07. 12. 14 ～ ‘08.1.25	25	(주)상승건설 현영희	견적입찰	공사완료	“
화북2동 황사평 대기동로 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D20mm~100mm L=1,000m	‘07. 12. 14 ～ ‘08.1.31	35	경남토건(주) 이화순	견적입찰	공사완료	“
화북2동 부록마을 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D20mm~75mm L=3,320m	‘07. 12. 17 ～ ‘08.3.14	114	(주)정도건설 서희윤	제한경쟁	공사완료	“
애월읍 장전, 고성지구 상수도관 태풍피해 복구공사	상수도관복구 D15mm~150mm L=4,574m	‘07. 12. 17 ～ ‘08.2.22	135	(주)상록개발 김만식	제한경쟁	공사완료	“

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
제주동중학교 동측 하수도 정비공사	하수도 L=533m	‘07. 11. 27 ~ 12. 26	155	유정건설(주) 김자영	제한경쟁	공사완료	제주지역사업소
제주학생문화원일원 하수도 비굴착보수공사	하수도 L=343m	‘07. 12. 6 ~ 12. 24	78	(주)동신엔지니어링 김한규	수의계약	공사완료	“
제주코아호텔 북서측일원 하수도흡입준설공사	하수도흡입준설 L=15,033m	‘07. 12. 20 ~ 12. 27	57	대명건설(주) 고태관	제한경쟁	공사완료	“
제주대입구 ~ 도남e편한세상APT간 하수도비굴착보수공사	하수도 L=1,798m	‘07. 12. 24 ~ '08.1.15	32	(주)동신엔지니어링 김한규	수의계약	공사완료	“
사라봉5거리 남동측외 시일원 하수도 흡입준설공사	하수도흡입준설 L=9,480m	‘07. 12. 27 ~'08.1.14	34	(주)성빈건설 장승택	제한경쟁	공사완료	“
외도동 외도천서측 오수관로 태풍나리피해복구공사	하수도 L=60.0m	‘07. 12. 24 ~'08.1.21	45	(주)성민건설 오태성	견적입찰	공사완료	“
월평동 중앙고일원 오수관로 태풍나리피해복구공사	하수도 L=67.5m	‘07. 12. 24 ~'08.1.21	42	서부건설(주) 이영익	수의계약	공사완료	“
외도동 조부천오수관로 태풍나리피해복구공사	하수도 L=180.0m	‘07. 12.. 27 ~'08.2.14	56	태화건설(주) 오경환	견적입찰	공사완료	“
용담동 한천 오수관로 태풍나리피해복구공사	하수도 L=350m	‘07. 12.. 31 ~'08.2.27	59	대홍건설(주) 김두평	견적입찰	공사완료	“
삼성여고 맞은편 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,159 D16~75mm	‘07.02.06. ~4.06.	29	(주)한영건설 한영남	견적입찰	공사완료	서귀포지역사업소
남주고 진입로 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=938 D16~100mm	‘07.02.08. ~3.29.	39	영일건설(주) 강복실	수의계약	공사완료	“
수산1리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,424 16~150mm	‘07.02.09. ~10.13.	76	영륭종합건설 김영호	수의계약	공사완료	“
신풍리 배수관 시설공사	상수도 배수관 시설 L=3,159 16~100mm	‘07.02.26. ~6.25.	77	세경건설(주) 오영남	제한경쟁	공사완료	“
가시리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,453 D16~65mm	‘07.02.28. ~6.27.	34	아란건설(주) 오한진	견적입찰	공사완료	“
신효북문 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,263 D16~80mm	‘07.02.28. ~4.28.	33	(주)흥화건설 김창원	견적입찰	공사완료	“
하례2리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,465 16~100mm	‘07.03.06. ~7.03.	33	동아수도공업사 박탁웅	견적입찰	공사완료	“
덕수리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=967 D16~65mm	‘07.03.08. ~7.05.	28	정완토건(주) 안종규	견적입찰	공사완료	“
무릉2리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,463 D16~65mm	‘07.03.19. ~6.10.	34	신성건설(주) 변규암	견적입찰	공사완료	“
화순리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=959 D16~75mm	‘07.03.14. ~6.11.	25	(주)하림건설 이은영	견적입찰	공사완료	“
세화리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,556 D16~65mm	‘07.03.19 ~7.16	64	성완건설 김도삼	견적입찰	공사완료	“
중문 배수지 구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,176 16~100mm	‘07.03.26. ~6.18.	68	경남토건(주) 김수영	제한경쟁	공사완료	“
도순 배수지 구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,202 20~100mm	‘07.03.23. ~5.21.	39	우남건설 고우성	견적입찰	공사완료	“
한남리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,303 D16~65mm	‘07.04.05. ~6.27.	30	(주)세화건설 현승필	견적입찰	공사완료	“
영락리 해안도로 배수관 시설공사	상수도 배수관 시설 L=3,825 D16~75mm	‘07.04.02. ~6.30.	85	(주)성림개발원 고금순	제한경쟁	공사완료	“
신흥리 배수관 시설 공사	상수도 배수관 시설 L=2,698 16~100mm	‘07.04.04. ~8. 1.	65	(주)한라엔지니어링 박성현	제한경쟁	공사완료	“
하천리(상동) 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,041 D16~75mm	‘07.04.05. ~6.23.	32	소양건설(주) 소원옥	견적입찰	공사완료	“
대포 약천사길 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,101 D16~50mm	‘07.04.09. ~7. 7.	43	윤성건설(주) 고기홍	견적입찰	공사완료	“

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
호근5로 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,868 D16~75mm	‘07.04.30. ~7.28.	53	신창토건(주) 임도규	견적입찰	공사완료	서귀포지역사업소
남원1리 광지동 배수관 시설공사	상수도관 배수관 시설 L=1,867 D25~150mm	‘07.05.04. ~7.30.	89	(주)유강이엔씨 강창언외1	제한경쟁	공사완료	“
동일1리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,427 D16~75mm	‘07.05.21. ~9.17.	25	신도종합건설(주)문기호	수의계약	공사완료	“
상모리 배수관 시설 공사	상수도 배수관 시설 L=2,047 D16~125mm	‘07.06.01. ~8.29.	71	제복건설(주) 고미순	제한경쟁	공사완료	“
안덕·대정 국도12호선 구간 상수도관 이설	상수도관 이설 L=6,585 D32~350mm	‘07.06.14. ~‘08.01.06.	228	(주)남경산업 박희관	수의계약	공사완료	“
안덕·대정 국도95호선 구간 상수도관 이설	상수도관 이설 L=3,428 D50~350mm	‘07.06.18. ~‘08.01.13.	153	삼진건설(주) 권혁찬외 2	수의계약	공사완료	“
상효 북문 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,489 D16~100mm	‘07.06.25. ~8.23.	43	신성건설(주) 변규암	견적입찰	공사완료	“
신산리 노후상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,743 D16~75mm	‘07.07.06. ~11.02.	38	영륭종합건설(주)김영호	수의계약	공사완료	“
동홍동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,297 D16~100mm	‘07.07.06. ~9.03.	35	서강기업(주) 박문홍	견적입찰	공사완료	“
대천동사무소 밑 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,476 D16~75mm	‘07.08.06. ~10.04.	34	세한건설(주) 양준호	견적입찰	공사완료	“
인성리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,385 D16~100mm	‘07.08.31. ~10.29.	39	우창건설(주) 조정일	견적입찰	공사완료	“
서홍동 한전 주변 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,369 D16~75mm	‘07.09.18. ~12.16.	80	(주)대석건설 정숙희	제한경쟁	공사완료	“
신흥 1․2리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=8,302 D16~100mm	‘07.09.27. ~12.29.	193	일조건설(주) 이여주	제한경쟁	공사완료	“
인성리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,385 D16~100mm	‘07.08.31. ~10.29.	39	우창건설(주) 조정일	견적입찰	공사완료	“
서홍동 한전 주변 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,369 D16~75mm	‘07.09.18. ~12.16.	80	(주)대석건설 정숙희	제한경쟁	공사완료	“
신흥 1․2리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=8,302 D16~100mm	‘07.09.27. ~12.29.	193	일조건설(주) 이여주	제한경쟁	공사완료	“
남원 1․2리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,602 D16~150mm	‘07.10.05. ~12.03.	37	협성건설(주) 양연선	견적입찰	공사완료	“
보성리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,086 D16~100mm	‘07.10.10. ~12.08.	31	신천공무사 최익환	견적입찰	공사완료	“
태흥리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,375 D16~50mm	‘07.10.15. ~12.10.	72	삼덕공무사 고창돈	견적입찰	공사완료	“
서호.호근 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,701 D16~65mm	‘07.10.23. ~12.21.	40	(주)유창건설 김찬숙	수의계약	공사완료	“
위미리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,298 D16~65mm	‘07.10.25. ~12.23.	33	산방건설 강경보	견적입찰	공사완료	“
남원리 신성동 배수관 시설공사	상수도 노후관 교체 L=1,749 D16~75mm	‘07.10.26. ~12.24.	42	(주)시몽건설 이숙희	견적입찰	공사완료	“
예래동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,527 D16~65mm	‘07.10.29. ~12.27.	42	명주건설(주) 이승림	견적입찰	공사완료	“
오조리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=6,682 D16~50mm	‘07.10.29. ~12.27.	81	일영건설 장태식	견적입찰	공사완료	“
한라산식당 북쪽 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,102 D16~100mm	‘07.11.06. ~12.25.	57	민경건설(주) 조덕천	수의계약	공사완료	“
위미리(중학교노선) 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,679 D16~65mm	‘07.11.19. ~12.28.	38	태윤토건(주) 오금숙	견적입찰	공사완료	“
호근지하수 배수관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,332 D16~100mm	‘07.11.19. ~12.28.	31	우신기업(주) 양홍기	견적입찰	공사완료	“

❏ 2008년도

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
월산정수장 급속침전지 정비공사	급속침전지 철거 425㎥ 침전지 지반정비 1,481㎥	‘08.1.30 ~2.29	34	삼양건설 이종팔	견적입찰	공사완료	상수도관리부
신촌지선 광역상수도 연계공사	PEP피복강관부설(D200㎜) : L=2,600m	‘08.2.25 ~6.30	213	(주)태아건설 김길영	제한경쟁	공사완료	“
조천지선 광역상수도 연계공사	PEP 피복강관 (φ200mm) L=3,430m	‘08.2.25 ~8.23	256	주왕건설(주) 강권희	제한경쟁	공사완료	“
외도수원지 보호구역 태풍나리피해 복구공사	휀스시설 133경간	‘08.2.29 ~3.28	33	(주)상승건설 현영희	견적입찰	공사완료	“
지하수관정 낙뢰방지장치 시설공사	정실2호지하수 관정 낙뢰방지장치 시설외 25	‘08.3.18 ~5.16	77	장원종합건설 (주) 한상철	제한경쟁	공사완료	“
광역정수장 운영실 제어용 중앙서버교체공사	토평정수장 운영실 서버 교체 3대 애월정수장 운영실 서버 교체 2대 남원정수장 운영실 서버 교체 1대	‘08.4.1 ~5.20	82	(주)제주삼보컴퓨터 이봉석	제한경쟁	공사완료	“
추자 예초리 복류수 이용시설 증설공사	송수관로(PE 100㎜) L=1,206.1m	‘08.4.3. ~6.4.	59	유창기업 박광조	수의계약	공사완료	“
도련정수장 배수지 시설공사	배수지 시설 V=2,000㎥/1지 송․배수관 D=300, 350m/m, L=62m	‘08.4.18 ~12.14	538	세일종합건설(주) 김태희	제한경쟁	추진중 (80%)	“
강정정수장 취수틀 태풍피해 복구공사	강정정수장 취수틀 태풍피해 복구 1식	‘08.4.28 ~6.2.	49	중앙산업주식회사 김대성	견적입찰	공사완료	“
어승생 송수관로 동부지선 노후관교체공사	송수관로(주철관 D450mm), L=1,759m	‘08.4.24 ~10.27	270	(주)일록건설 고영수	제한경쟁	공사완료	“
추자 저수지 및 담수화시설 급속여과기여재 교체공사	제3저수지 급속여과기 2기(다층 1, A/C1) 담수화시설 급속여과기 4기(다층 2, 모래 2기)	‘08.5.6. ~6.20.	40	혜승건설(주) 신명호	견적입찰	공사완료	“
강정정수장 상수원보호구역 태풍피해(울타리) 복구공사	울타리 시설(능형망휀스W2.0*H2.0m)121경간	‘08.5.8 ~6.24.	32	재흥건설(주) 고희승	견적입찰	공사완료	“
우도 예비 배수지 개량공사	철근 콘크리트 스라브(8.5*7.5) 1개소 배수지 방수(시멘트 액체방수) 163㎡ 잡철 및 염소투입기 설치 1식	‘08.5.16 ~6.15	25	(주)도경건설 고범환	견적입찰	공사완료	“
추자 묵리 예초리 복류수시설 전기공사	전기인입설비공사(예초리, 묵리) 1식	08.5.24 7.11	31	이도전기공사 고윤주	견적입찰	공사완료	“
덕수가압장 수중모터펌프 인양설치공사	수중모터펌프 교체 100HP 1대, 체크밸브 2개소 설치	08.6.10 ~7.10	27	재능엔지니어링 김동석	견적입찰	공사완료	“
중문지구 광역상수도 연결공사	주철관(D400mm), L=2,260m	‘08.6.20 ~12.17	333	청구건설(주) 백광선	제한경쟁	추진중 (80%)	“
오라정수장 자동여과기 증설공사	자동여과기 증설 (5,000㎥/일) 1기	‘08.7.18 ~11.15	46	재흥건설(주) 고희승	견적입찰	추진중 (98%)	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
애월지구 배수관로 정비공사	상수도관 부설 (PE D15~100mm), L=2,565m 감압밸브설치 : 4개소, 유량계설치 1개소	‘08.8.5 ~10.4.	127	(주)대운건설 고명선	제한경쟁	공사완료	상수도관리부
어승생 송수관로 돌문화박물관 앞노후관 교체공사	노후송수관로 교체 (주철관 D350mm) L=267m	‘08.8.8 ~10.5	42	동신건설(주) 양성하	견적입찰	공사완료	“
강정정수장 송배수관 이설공사	주철관 D=500mm L=372m, D=700mm L=372m	‘08.8.27 ~11.25	81	(주)영도종합건설 고영두	수의계약	추진중 (80%)	“
추자면 제4저수지 도수로 교체및 정비공사	도수로 교체 : L=438.4m 도수로 정비 : L=142.9m	‘08.10.10 ~12.25	81	대웅토건주식회사 황선태	견적입찰	추진중 (30%)	“
아라 산천단배수지 가압시설 설치공사	가압시설 설치 4대, 유량계(150mm)설치 1개소	‘08.10.6 ~11.15	27	규성개발(주) 권형택	견적입찰	추진중 (98%)	“
아라 산천단배수지 가압시설 전기공사	가압시설 전기인입 시설 1개소	‘08.10.6 ~11.15	45	화진전기(주) 이용안	견적입찰	추진중 (98%)	“
월산정수장 홍보관 인테리어공사	홍보관 인테리어 및 영상시설 1식	‘08.10.14 ~12.14	42	21세기건축장식 좌명금	견적입찰	추진중 (30%)	“
강정정수장 홍보관 인테리어공사	홍보관 인테리어 및 영상시설 1식	‘08.10.14 ~12.14	57	한일건축장식 임경택	견적입찰	추진중 (30%)	“
성읍지구 배수지 시설공사	배수지 시설 V=600㎥/1지, 송․배수관 D=150, 200m/m, L=929m	‘08.10.17 ~09.4.5	343	은하종합건설 (주) 현창익	제한경쟁	추진중 (10%)	“
용담수원지 무인자동시스템 제작설치	용담수원지 무인자동시스템 구축 1식	‘08.3.3 ~5..26	43	엘지산업 김경탁	견적입찰	설치완료	“
이호수원지 무인자동시스템 제작 설치	이호수원지 무인자동시스템 구축 1식 이호수원지 고압 수,배전반 제작설치 1식	‘08.3.14 ~6.11	220	한성전기주식회사 정은경	제한경쟁	설치완료	“
외도수원지 무인자동시스템 제작 설치	외도수원지 무인자동시스템 구축 1식	‘08.3.14 ~6.10	88	협신기전 양규식	제한경쟁	설치완료	“
오라정수장 원격관리시스템 제작설치	정수장 원격관리시스템 제작설치 1식	‘08.3.17 ~6.10	233	대은계전 강미영	제한경쟁	설치완료	“
강정정수장 원격관리시스템 제작설치	강정정수장 원격관리시스템 제작설치 1식	08.3.19 6.10	407	피아이디시스템(주) 김혜석	지명경쟁	설치완료	“
광역정수장 노후 자동화 설비 교체 설치	배터리 교체설치 9개소 UPS교체 설치 6개소	08.3.20 ~5.19	118	대한민국상이군경회 강달신	수의계약	설치완료	“
시흥3호 지하수외 7개소 태풍피해 복구용지하수 기동반 제작 교체	시흥3호 지하수기동반 제작교체외 7개소	08.1.11 ~3.4	73	엘지산업 김경탁	제한경쟁	설치완료	“
지하수관정 원격관리시스템 제작 설치	지하수관정 원격관리 제작설치 30개소	08.3.14 ~7.18	270	제우테크 윤정선	제한경쟁	설치완료	“
예비용 지하수 압상파이프 제작 구입	지하수용 압상파이프 200본	08.4.2 ~5.26	56	재능엔지니어링 김동석	제한경쟁	구입완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
삼양 1 2수원지 무인자동시스템 제작설치	무인자동시스템 제작 설치 1식	08.9.22 ~12.21	133	이엔씨계전산업 이춘심	제한경쟁	추진중 (30%)	상수도 관리부
아라 산천단배수지 가압시설 배전반제작설치	제어반 제작설치 5면, 배전반 제작설치 1면	08.10.2 ~11.1	30	엘지산업 김경탁	견적입찰	설치완료	“
예비용 지하수 압상파이프 제작 구입	지하수용 압상파이프 100본	08.10.20 ~12.19	41	자연환경기술(주) 김호원	견적입찰	추진중 (40%)	“
사라봉정수장 무인자동시스템 제작설치	무인자동시스템 제작 설치 1식	08.10.20 ~12.8	63	(주)세명전기 유연성	제한경쟁	추진중 (30%)	“
예비용 수중모터펌프 제작 구입	수중모터 16대 수중펌프 14대	‘08.8.11 ~9.30	232	대한장애인복지회 배춘섭	수의계약	구입완료	“
애월지구 광역상수관로 연계공사	배수관로 L=1,287m	‘08.3.14 ～‘08.9.10	246	우광건설(주) 양재수	제한경쟁	공사완료	수자원개발부
지하수 폐공 원상 복구 공사	지하수 페공 원상 복구 24공	‘08.5.29 ～8.20	63	남천개발 고병주	제한경쟁	공사완료	“
덕천지구 광역상수관로 연계공사	배수지 V=3,000㎥ 송․배수관로 L=1,656m	‘08.5.30 ～‘09.1.29	993	장호종합개발(주) 오윤탁	제한경쟁	추진중 (80%)	“
덕천지구 광역상수관로 연계공사 계측기기 제작 설치 공사	계측기기 및 유량계반 제작 설치 1식 수위전송반(TM) 제작 설치 1식 조천정수장 운영실(TM)개조 1식	‘08.6.11 ~‘09.2.11	39	대원계전산업 정광자	견적입찰	추진중	“
지하수 폐공 원상 복구 공사(2차)	지하수 페공 원상 복구 15공	‘08.10.8 ～11.26	46	(주)남원건설 고재욱	제한경쟁	추진중 (60%)	“
예래․중문지구 광역상수관로 연계공사	배수관로 L=4,058m	‘08.10.14 ～‘09.6.13	658	영진종합건설(주) 한영선	제한경쟁	추진중 (5%)	“
골프장 원격검침 시스템 설치 공사	스테인리스 파이프 배관 및 플랜지 설치 1식 통신 공사 1식	‘08.10.22 ～‘09.2.18	203	세창통신 김창석	제한경쟁	추진중 (5%)	“
서호호근지구 하수관거 정비사업 (2차분)	하수관거정비 L=3.1km	'08.02.04 ~11.3	1,224	유성건설(주) 김영철	경쟁입찰	추진중 (99%)	하수도 관리부
서광동리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분)	소규모처리시설(90㎥/일) 하수관거 L= 3.2Km	‘08.02.05 ~‘09.02.20	1,258	신산종합건설 부영권 (주)대림개발 오동헌	경쟁입찰	추진중 (75%)	“
동상효지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.8km	'08.02.12 ~'09.2.11	958	한양종합건설 김성택	경쟁입찰	추진중 (90%)	“
법호촌지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=0.7km	'08.02.12 ~7.11	360	형주종합건설 김경희	경쟁입찰	공사완료	“
예래중동지구 하수관거 정비사업 (2차분)	하수관거정비 L=2.2km	'08.02.18 ~'09.02.17	870	흥남종합건설 김원하	경쟁입찰	추진중 (90%)	“
색달지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.0km	'08.02.20 ~7.19	526	동마종합건설 강창수	경쟁입찰	공사완료	“
상예우남지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.9km	'08.02.20 ~10.19	674	지성종합건설임지택	경쟁입찰	공사완료	“
보목지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.3km	'08.02.21 ~8.20	579	산방종합건설 주미경	경쟁입찰	공사완료	“
하효지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.0km	'08.03.04 ~7.03	366	광개토개발 임동욱	경쟁입찰	공사완료	“
토평지구 하수관거 정비사업(2차분)	하수관거정비 L=1.2km	'08.03.04 ~11.3	840	유성건설(주) 김영철	경쟁입찰	추진중 (98%)	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
안덕~대정간 도로확장 및 포장구간 하수관거 정비공사	하수관거 L= 1.4Km	‘08.04.28 ~7.27	302	용천건설(주) 한승희	경쟁입찰	공사완료	하수도 관리부
무릉좌기동 농어촌마을하수도 설치공사(1차분)	하수관거 L= 0.3Km	‘08.06.02 ~’09.01.08	539	제삼종합건설 진경선	경쟁입찰	추진중 (75%)	“
성읍남문 농어촌마을하수도 개량사업	소규모처리시설 개량1식(120㎥/일)	‘08.06.02 ~’09.02.02	391	동현환경(주) 부경용	경쟁입찰	추진중 (80%)	“
신산리 하수관거 정비공사	하수관거 L=0.17km	‘08.06.03 ~09.03	21	유정건설(주) 김자영	수의계약	공사완료	“
성산2공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 3.2Km	‘08.06.30 ~12.27	1,642	성림건설(주) 장한식	경쟁입찰	추진중 (65%)	“
법환지구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거정비 L=2.9km	'08.07.01 ~‘09.2.16	700	용빈종합건설 이문자	경쟁입찰	추진중 (65%)	“
대정1공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 4.5Km	‘08.07.02 ~12.29	1,873	신산종합건설 문덕진	경쟁입찰	추진중 (65%)	“
성산1공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 1.8Km	‘08.07.23 ~12.30	1,800	장원종합건설 한영선	경쟁입찰	추진중 (65%)	“
대정2공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 3.1Km	‘08.07.23 ~12.30	1,404	성지건설개발 백찬효	경쟁입찰	추진중 (65%)	“
안덕1공구 하수관거 정비공사(1차분)	하수관거 L= 2.1Km	‘08.07.23 ~12.30	1,011	영륭종합건설 김영호	경쟁입찰	추진중 (65%)	“
추자 묵리 오수관로 시설 공사	오수관거 L=727m	'08.03.10 ~7. 7	367	협성건설(주) 양연선	경쟁입찰	공사완료	“
제주시 읍면지역 (옹포일원) 하수관거 정비공사	오수관거 L=47.4m	'08.07.16 ~8.25	24	삼건건설(주) 김희철	경쟁입찰	공사완료	“
추자면 영흥리 농어촌 마을하수도 정비공사	소규모처리시설 개량1식(100㎥/일)	‘08.07.29 ~12.26	202	동현환경(주) 부경용	경쟁입찰	추진중 (80%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한림처리분구)	하수관거 정비 L=3.6㎞	‘08.09.02 ~‘11.09.02	1,603	나인건설(주) 김희준	경쟁입찰	추진중 (25%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (애월처리분구)	하수관거정비 L=17.1㎞	'08.09.19 ~'11.09.19	6,483	풍인건설(주) 김신	경쟁입찰	추진중 (25%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (구좌처리분구)	하수관거정비 L=20.79㎞	'08.09.19 ~'11.09.19	6,545	세기건설(주) 양문석	경쟁입찰	추진중 (25%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (조천처리분구)	하수관거정비 L=4.65㎞	'08.09.02 ~'11.09.02	2,408	제동종합 건설(주) 홍현철	경쟁입찰	추진중 (25%)	“
제주시 읍면지역 하수관거 정비공사 (한경처리분구)	하수관거정비 L=8.36㎞	'08.09.02 ~`11.09.02	2,867	대길토건(주) 오정원	경쟁입찰	추진중 (25%)	“
금악리 농어촌마을 하수도 정비공사	하수관거 L=758m	‘08.09.02 ~‘09.01.30	202	(주)승진건설 고연숙	경쟁입찰	추진중 (40%)	“
김녕마을안 침수지역 배수로 정비공사	조립식 PC BOX L=49.5m	‘08.10.06 ~‘09.01.04	35	대홍건설(주) 김두평	경쟁입찰	추진중 (40%)	“
호근위생처리장 원심분리탈수기 보수공사	원심분리탈수기 2대	‘08.02.25 ~5.02	36	(주)로얄정공 박재덕	수의계약	공사완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
서귀포시 하수관 준설공사	준설1,430㎥	‘08.03.03 ~‘09.01.02	264	(주)한마음 건설 강종철	경쟁입찰	추진중 (99%)	하수도 관리부
동부하수처리장 축구장정비공사	축구장정비	‘08.04.28 ~6.29	30	대영종합 건설 김순희	견적입찰	공사완료	“
성읍남문 소규모 하수처리시설 전기공사	전기공사	‘08.06.11 ~12.08	26	(주)금강전기 원종철	견적입찰	추진중 (98%)	“
태풍나리피해복구추자면 분뇨처리장시설공사	공사1식	‘08.06.11 ~11.08	255	우진종합 건설(주) 김강우	경쟁입찰	추진중 (98%)	“
대정하수처리장 등부표 태풍나리피해복구 및 인양정비복구공사	공사1식	‘08.06.13 ~7.13	25	세풍건설(주) 이명실	견적입찰	공사완료	“
태풍나리복구 추자면 분뇨처리장 전기공사	전기공사	‘08.07.07 ~11.05	29	태영전력 김영삼	견적입찰	추진중 (98%)	“
대정위생처리장 화학적처리시설 보강공사	공사1식	‘08.08.20 ~10.10	45	동현환경(주) 부경용	견적입찰	공사완료	“
추자면 분뇨처리시설 태풍피해복구공사	분뇨처리장오수관로	‘08.08.22 ~10.14	50	기흥건설(주) 장봉문	견적입찰	추진중 (중지)	“
보목하수처리장 관할펌프장 발전기 설치공사	비상발전기 4개소	‘08.10.07 ~12.27	61	건영전기 정유석	견적입찰	추진중 (20%)	“
자외선 소독설비 램프안정기 교체공사	자외선램프외3종	‘08.10.21 ~12.12	32	세 흥 전기통신 강영구	견적입찰	추진중 (20%)	“
신시가지 펌프장 비상발전기 설치공사	비상발전기	‘08.10.27 ~12.27	24	흥일전력(주) 윤효선	견적입찰	추진중 (20%)	“
간이펌프장 수중모터 펌프구입	수중모터펌프	‘08.02.25 ~4.24	25	명신기계 이광옥	수의계약	구입완료	“
제주하수처리장 저압 분전반 제작구입설치	저압MCC	'08.06.18 ~9.02	163	삼원산업 이준호	경쟁입찰	설치완료	“
제주하수처리장 실험분석기기구입	실헙분석기기	‘08.08.11 ~9.11	28	한라바이오랩 강병식	견적입찰	구입완료	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
구좌읍 상덕천 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=5,418m	‘08. 3. 4 ~ 5.1	124	(주)대명토건 문상규	제한경쟁	공사완료	제주지역사업소
코스모스호텔 서축 주변 노후관 교체 공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,308m	‘08. 3. 4 ～ 6. 12	179	청호환경건설 (주) 이정언	제한경쟁	공사완료	“
구 송림각주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,266m	‘08. 3. 7 ～ 6. 13	137	남전토건(주) 김진호	제한경쟁	공사완료	“
영평배수지 북측 배수관 시설공사	배수관시설 D300mm L=245m	‘08. 3. 14 ~ 4. 15	51	(주)태승건설 고원춘	견적입찰	공사완료	“
한림읍 금능리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~125mm L=3,570m	‘08. 3. 26 ～ 6. 23	161	(주)웅진건설 송승천	제한경쟁	공사완료	“
연북로~보건소간 배수관 시설공사	노후관 교체 D3000mm~100mm L=2,070m	‘08. 3. 27 ~ 7. 23	193	남전토건(주) 김진호	제한경쟁	공사완료	“
동문파출소~동문로타리간 노후관 교체공사	노후관 교체 D300mm L=270m	‘08. 3. 31 ～ 5. 28	74	삼건건설(주) 김희철	견적입찰	공사완료	“
한경면 조수1리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=4,169m	‘08. 4. 3 ～ 5. 30	160	(주)토기 고병찬	제한경쟁	공사완료	“
조천읍 교래리 급수취약지구 상수도관로 신설공사	상수도관부설(PE) D200mm L=756m 감압밸브설치1개소	‘08. 4. 10 ～ 5. 10	83	(주)진일토건 김승율	제한경쟁	공사완료	“
구 오라동사무소 동측 5개소 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm,L=390m 개인급수관교체 : 42개소	‘08. 4. 14 ～ 7. 21	46	(주)청우건설 고명오	견적입찰	공사완료	“
조천읍 신촌리 상수도 급수관 확장공사	상수도관부설 D15mm~200mm L=1,289m	‘08. 4. 17 ～ 6. 20	94	(주)청화산업개발 변대중	견적입찰	공사완료	“
난지농업연구소~연북로간 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~150mm L=1,008m	‘08. 4. 23 ～ 7. 21	56	(주)강진건설 오택부	견적입찰	공사완료	“
애월읍 고내리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D50mm~125mm L=3,570m	‘08. 5. 2 ～ 7. 29	213	규성개발(주) 권형택	제한경쟁	공사완료	“
남광파출소 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~100mm L=1,530m	‘08. 5. 2 ~ 7. 10	139	우신기업(주) 양홍기	제한경쟁	공사완료	“
도남초등학교 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=1,700m	‘08. 5. 6 ~ 8. 1	179	윤성건설(주) 고기홍	제한경쟁	공사완료	“
조천읍 함덕리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=3,631m	‘08. 5. 23 ~ 10. 16	190	(주)정현토건 이지만	제한경쟁	공사완료	“
아라교서측~구산 마을간 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm L=420m 개인급수관교체:25개소	‘08. 6. 2 ~ 9. 9	37	법윤토건(주) 이윤철	견적입찰	공사완료	“
상수도 원격검침 시스템 설치공사	전자식수도미터기설치 : 500개소	‘08. 6. 20 ~ 9. 17	63	(주)이비 홍용남	견적입찰	공사완료	“

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
한림읍 귀덕3리 급수 취약지구 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=903m 감압밸브설치1개소	‘08. 6. 23 ~ 7. 23	57	(주)유성 권익범	견적입찰	공사완료	제주지역사업소
한경면 청수리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~150mm L=7,958m	‘08. 6. 24 ~ 9. 10	230	(주)대명건설 고태관	제한경쟁	공사완료	“
염통배수지 북측 배수관 이설공사	노후관 교체 D400mm L=120m	‘08. 6. 24 ~ 7. 18	25	신명건설(주) 양정하	견적입찰	공사완료	“
조천읍 대흘1리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~150mm L=860m	‘08. 6. 30 ~ 9. 24	24	장원종합건설 (주) 한상철	수의계약	공사완료	“
오라정수장 서측외 15개소 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~20mm L=720m 개인급수관교체 : 57개소	‘08. 7. 1 ~ 9. 9	49	(합)동남종합건설 고광민	견적입찰	공사완료	“
애월읍 광령1리 보행자 통행시설 정비공사장내 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=577m	‘08. 7. 2 ~ 9. 1	21	(주)대명토건 문상규	수의계약	공사완료	“
일도2동 영락교회 북측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=306m	‘08. 8. 1 ~ 9. 9	50	신성건설(주) 변규암	견적입찰	공사완료	“
오라동 삼우식당 북측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=438m 개인급수관교체 : 29개소	‘08. 8. 13 ~ 11. 10	42	(주)도경건설 고범환	견적입찰	추진중 (90%)	“
한림읍 금악리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=10,134m	‘08. 8. 19 ~ 12. 17	290	금오건설(주) 강용진	제한경쟁	추진중 (70%)	“
애월읍 소길리 새마을금고 연수원주변 상수도관로 확충공사	상수도관부설(PE) D150mm~100mm L=2,575m	‘08. 8. 26 ~ 11. 3	114	우신기업(주) 양홍기	제한경쟁	추진중 (99%)	“
교육박물관 서측주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~100mm L=1,532m	‘08. 9. 10 ~ 12. 18	184	(주)상록개발 김만식	제한경쟁	추진중 (80%)	“
오라동사무소 동측 배수관 이설공사	배수관시설 D150mm~400mm L=186m	‘08. 9. 18 ~ 12. 26	38	전진종합건설 (주) 양호선	수의계약	추진중 (70%)	“
조천읍 신촌리 신와선 급수관 확장공사	주철 및PE관 부설 D15mm~200mm L=4,291m	‘08. 9. 23 ~ ‘09. 1. 22	138	(주)연방종합건설 강묘생	수의계약	추진중 (40%)	“
삼도1동 751-1주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D50mm~80mm L=744m	‘08. 9. 26 ~ 12. 24	75	(주)자유건설 이호준	견적입찰	추진중 (20%)	“
한림읍 한림리 ~ 월령리간 상수도관 신설공사	상수도관 신설(PE) D150mm L=844m	‘08. 9. 30 ~ 10. 13	26	(주)승진건설 고연숙	견적입찰	공사완료	“
환경사업소 ~ 번영로간 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체 D100mm L=1,004m	‘08. 10. 2 ~ 12. 30	82	(주)대흥건설 진성호	견적입찰	추진중 (50%)	“
신산미화아파트 주변 노후관 교체공사	노후관 교체 D100mm~50mm L=604m	‘08. 10. 1 ~ 12. 29	79	대명건설(주) 고태관	견적입찰	추진중 (85%)	“
구좌읍 월정리 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D100mm~15mm L=4,808m	‘08. 10. 10 ~ 12. 28	205	근형건설(주) 강숙희	제한경쟁	추진중 (30%)	“

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
애월읍 하귀1리 마을안 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D75mm~15mm L=3,327m	‘08. 10. 20 ~ 12. 18	137	(주)대광건설 오유순	제한경쟁	추진중 (20%)	제주지역사업소
한림읍 금악리 마을안 상수도 노후관 교체공사(4본선)	노후관 교체(PE) D75mm~15mm L=3,264m	‘08. 10. 21 ~ 12. 15	74	유성건설(주) 김남식	수의계약	추진중 (20%)	“
제주시 동지역(동부) 하수도 흡입준설 단가계약공사	하수도흡입준설 L=120km	‘08. 5. 2 ~ 11. 14	223	(주)한마음건설 강종철	제한경쟁	추진중 (97%)	“
제주시 동지역(서부) 하수도 흡입준설 단가계약공사	하수도흡입준설 L=120km	‘08. 5. 2 ~ 11. 14	201	대명건설(주) 고태관	제한경쟁	추진중 (97%)	“
제주시 읍면지역 하수도 흡입준설공사	하수도흡입준설 L=68km	‘08. 5. 2 ~ 09.1.30	128	대성토건(주) 최승미	제한경쟁	추진중 (92%)	“
오라동 정실마을일원 하수도 정비공사	하수도 L=441.4m	‘08. 7. 4 ~ 10. 29	141	지안건설(주) 김인행	제한경쟁	공사완료	“
사라봉5거리외 시일원 하수도비굴착보수공사	하수도 L=141.5m	‘08. 9. 8 ~ 9. 22	51	(주)용평건설 김정현	수의계약	공사완료	“
일도2동 서해아파트일원 하수도 정비공사	하수도 L=160m	‘08. 6. 13 ~ 9. 2	58	하지산업(주) 이승언	견적입찰	공사완료	“
농협삼양지점 남측일원 하수도 정비공사	하수도 L=210.0m	‘08. 6. 13 ~ 9. 5	56	규성개발(주) 권형택	견적입찰	공사완료	“
아라동 대화여객 차고지앞 하수도 정비공사	하수도 L=259.0m	‘08. 6. 13 ~ 9. 5	57	영남건설(주) 김인홍	견적입찰	공사완료	“
동광초등학교 북측일원 하수도 정비공사	하수도 L=149.9m	‘08. 6. 16 ~ 8. 12	70	삼육건설(주) 김성수	견적입찰	공사완료	“
민속오일시장 북측 하수도정비공사	하수도 L=15.3m	‘08. 6. 16 ~ 8. 12	27	동방건설(주) 고민수	견적입찰	공사완료	“
연동 국민은행앞 하수도정비공사	하수도 L=209.0m	‘08. 6. 18 ~ 9. 11	66	삼부포장건설(주) 안기철	견적입찰	공사완료	“
삼양동 원당봉일원 하수도정비공사	하수도 L=142.1m	‘08. 6. 16 ~ 8. 29	36	석광건설(주) 박향희	견적입찰	공사완료	“
화북주유소앞 하수도정비공사	하수도 L=45.0m	‘08. 10. 23 ~ 12. 22	36	세한건설(주) 양준호	견적입찰	추진중 (20%)	“
이호동민주빌라앞 하수도정비공사	하수도 L=55.0m	‘08. 10. 30 ~ 12. 29	24	(주)미건 박승희	견적입찰	추진중 (20%)	“

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
성산포(섭지코지)배수관 시설공사	배수관 시설 L=2,750m D150~250mm	'08.02.19. ~5.14.	154	아란건설㈜ 오한진	제한경쟁	공사완료	서귀포지역사업소
수산리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,892m D16~150mm	'08.02.22. ~6.20.	95	남천개발 고병주	견적입찰	공사완료	"
신풍리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,228m D16~65mm	'08.03.03. ~5.01.	31	기암건설㈜ 현상훈	견적입찰	공사완료	"
신례리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,055m D16~100mm	'08.03.04. ~7.01.	125	㈜ 웅진건설 송승천	제한경쟁	공사완료	"
용흥동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,272 D16~65mm	'08.03.10. ~6.07.	94	명부건설㈜ 허명자	견적입찰	공사완료	"
가시리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,336 D16~75mm	'08.03.25. ~6.22.	32	협성건설㈜ 양연선	견적입찰	공사완료	"
난산리 배수관 개량공사	상수도 노후관 교체 L=1,631m D150~200mm	'08.03.26. ~6.23.	148	흥산환경건설㈜ 이택관	제한경쟁	공사완료	"
유리박물관 급수공사	상수도관 신설 L=1,340 D16mm	'08.04.07. ~5.16.	28	법윤토건㈜ 이윤철	견적입찰	공사완료	"
신양리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,752 D16~50mm	'08.04.07. ~7.05.	29	대지건설㈜ 양성홍	견적입찰	공사완료	"
화순리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=761 D16~50mm	'08.04.16. ~7.14.	21	정완토건㈜ 안종규	견적입찰	공사완료	"
사계리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=864 D16~50mm	'08.04.18. ~7.16.	20	대양공영㈜ 조근홍	견적입찰	공사완료	"
신도리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,298 D16~100mm	'08.04.30. ~7.28.	59	(주)협신 김연신	견적입찰	공사완료	"
신산리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=839 D16 ~65mm	'08.05.14. ~8.11.	22	민경건설㈜ 조덕천	견적입찰	공사완료	"
상효배수지 남쪽 사유지 상수도관 이설공사	상수도 노후관 교체 L=1,050 D16~50mm	'08.06.09. ~8.07.	21	주왕건설㈜ 강권희	견적입찰	공사완료	"
호근배수지구간 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,463 D16~100mm	'08.06.30. ~10.27.	74	㈜정현토건 이지만	견적입찰	공사완료	"
서귀포시 블록시스템구축 및 누수탐사 사업	블록시스템구축7개블록, 누수탐사사업 7개마을	'08.06.27. ~12.26.	602	㈜한국빅텍 김장기외 1인	제한경쟁	추진중 (70%)	"
동광리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=717 D16~150mm	'08.07.01. ~9.28.	54	㈜토기 고병찬	견적입찰	공사완료	"
의귀리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=6,626 D16~100mm	'08.07.11. ~10.08.	136	화성건설(주) 성길훈	제한경쟁	공사완료	"
남주고주변 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,339 D16~100mm	'08.07.21. ~10.18.	39	신세기건설안전 진선자	견적입찰	공사완료	"
서귀포시 서부지역 계량기 이설 및 교체공사	계량기이설 146개소, 계량기 교체 226개소	'08.08.11. ~10.19.	31	대성토건㈜ 강태욱	견적입찰	공사완료	"
서귀포시 동부지역 계량기 이설 및 교체공사	계량기 이설 115개소, 계량기 교체 293개소	'08.08.12. ~10.20.	29	해성건설㈜ 양성홍	견적입찰	공사완료	"
상모리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=457 D16~100mm	'08.08.13. ~10.11.	22	㈜정방건설 임선희	견적입찰	공사완료	"

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사개요	공사기간	사업비	계약상대자	계약방법	추진상황	비 고
보목동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1.45k D16~100mm	'08.08.13. ~11.10.	33	㈜정방건설 임선희	견적입찰	추진중 (95%)	서귀포지역사업소
구억리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=676 D16~40mm	'08.08.25. ~10.23.	31	㈜광명산업개발 김성수	견적입찰	공사완료	"
고성리 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=494 D16~100mm	'08.09.04. ~12.02.	29	㈜우림 권기성	견적입찰	추진중 (95%)	"
서광동리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,516 D16~50mm	'08.09.25. ~11.23.	42	세풍건설㈜ 이명실	견적입찰	추진중 (70%)	"
남원2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=676 D16~100mm	'08.09.29. ~11.27.	117	㈜성지건설 안정학	제한경쟁	추진중 (70%)	"
서홍동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=676 D16~40mm	'08.09.24. ~12.22.	40	윤성건설㈜ 고기홍	견적입찰	추진중 (70%)	"
창천리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=4,386 D16~50mm	'08.10.07. ~12.05.	103	세상건설㈜ 김석봉	제한경쟁	추진중 (30%)	"
위미2리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=5,788 D16~100mm	'08.10.06. ~12.04.	118	신영건설㈜ 한미숙	제한경쟁	추진중 (30%)	"
서귀포시 송산동지역 상수도 노후계량기 교체공사	계량기 교체 433개소(D15 ~D75)	'08.10.10. ~12.18.	22	대웅토건㈜ 황선태	견적입찰	추진중 (10%)	"
상모1리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=560 D20~100mm	'08.10.15. ~12.13.	27	근형건설㈜ 강숙희	견적입찰	추진중 (30%)	"
표선리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,707 D16~100mm	'08.10.17. ~12.15.	81	풍진산업개발㈜ 고희숙	견적입찰	30%	"
서귀포시(동지역)요철제수변 정비공사	요철제수변정비 104개소	'08.10.16. ~12.14.	47	전진토건 현태전	수의계약	20%	"
수망리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=9,714 D16~100mm	'08.10.23. ~12.21.	211	(주) 국영 송정식	제한경쟁	10%	"
동홍동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,472 D16~65mm	'08.10.29. ~12.27.	35	신영건설㈜ 한미숙	견적입찰	10%	"
삼달리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,611 D16~125mm	'08.10.23. ~12.21.	31	경성토건㈜ 김양은	견적입찰	10%	"
하천리 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=2,923 D16~75mm	'08.10.29. ~12.27.	81	도일건설㈜ 김인숙	견적입찰	10%	"
회수동 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=3,670 D16~100mm	'08.10.28. ~12.26.	73	정완토건㈜ 안종규	견적입찰	10%	"

14. 각종 공사 설계변경 현황

❏ 2006년도

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
어승생수원 정수처리 시설설치공사2차분	5,810	06.8.16 ~12.22	5,741			▵69	실제 시공물량 정산 및 현장여건에 맞춰 조정	상수도 관리부
대정읍 신평리 소규모 오수처리시설	118	‘06.10.23 ~’07.01.30	146	-	-	28	준공에 따른 물량정산	하수도 관리부
대정읍 신평리 분류식 하수관거시설공사	846	‘06.09.01 ~’07.02.28	843	-	-	△3	“	“
동홍천 하수도 보수공사	74	'06.10.2 ~12.26	90	-	-	16	준공에 따른 물량 정산	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업시설공사 장전정수 전체1회	3,999	‘04.10.19 ~‘08.12.31	3,799	-	-	▵200	암수량감소 시공수량정산	수자원 개발부
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업시설공사 회수정수 전체2회	3,098	‘04.10.19 ~‘08.12.31	3,125	-	-	27	시공수량정산	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업시설공사 금악정수 전체2회	2,217	‘04.10.19 ~‘08.12.31	2,218	-	-	1	시공수량정산	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업시설공사 서광정수 전체1회	2,800	‘04.10.19 ~‘08.12.31	2,872	-	-	72	암수량감소 시공수량정산	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업시설공사 장전정수 전체2회	3,799	‘04.10.19 ~‘08.12.31	3,805	-	-	6	시공수량정산	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업전기공사 장전계통 전체2회	1,208	‘04.12.25 ~‘07.12.15	1,217	-	-	9	시설물 위치변경에 따른 물량증가	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업시설공사 금악계통전기 전체 2회	334	‘04.10.15 ~‘07.02.07	370	-	-	36	케이블규격변경	“
상도지구 광역상수관로 연계공사	329	‘06.09.26 ~‘07.02.12	347	-	-	18	시공물량증가	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 장전정수시설 공사 전체3회	3,805	‘04.10.19 ~‘08.12.31	3,870	-	-	65	시공물량증가	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 금악정수시설 공사 전체3회	2,218	‘04.10.19 ~‘08.12.31	2,219	-	-	1	시공물량증가	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 서광정수시설 공사 전체3회	2,872	‘04.10.19 ~‘08.12.31	3,025	-	-	153	시공물량증가	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 회수정수시설 공사 전체3회	3,125	‘04.10.19 ~‘08.12.31	3,172	-	-	47	시공물량증가	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
화순리(학교앞)소규모 노후관 교체공사	2	‘06.09.18 ~10.17	3	-	-	1	지역주민 건의로 관로 연장 추가	서귀포지역사업소
신평리(학교뒤)노후관 교체공사	5	‘06.10.09 ~11.17	7	-	-	2	구간 연장증가로 설계변경	“
표선리(중학교~소방서) 노후관 교체공사	38	‘06.11.06 ~12.15	39	-	-	1	제수변 추가에 따른 증가	“
사계리 마을안 노후 상수도관 교체공사	120.7	‘06.11.10 ~12.19	120.4	-	-	△0.3	관로변경에 따른 물량감소	“

❏ 2007년도

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
산천단배수지 시설공사	1,088	‘07.6.4 ~08.6.3	1,073			△15	실제 시공물량 정산 및 현장 여건에 맞춰 조정	상수도 관리부
추자 지하수 개발공사	86	‘07.4.6 ~10.6	108			22	실제 시공물량 정산 및현장여건에 맞춰 조정	“
어승생 Y계곡 취수원 공사	36	‘07.9.21 ~9.28	28			△8	실제 시공물량 정산 및 현장여건에 맞춰 조정	“
구억~인성간 차집관로 시설공사	1,066	‘06.06.19 ~2.18	1,024	-	-	△42	준공에 따른 물량정산	하수도 관리부
대정1공구 하수관거정비 시설공사(4차분)	785	‘07.02.27 ~12.26	1,035	-	-	250	사업지구내 침수지역 우수관거(L=420m)물량증가 및 준공에 따른 물량정산	“
대정2공구 하수관거정비 시설공사(4차분)	1,982	‘07.02.27 ~12.26	2,277	-	-	295	사업지구내 침수지역 우수관거(L=208m) 및 오수관거(L=420m) 물량증가 및 준공에 따른 물량정산	“
안덕1공구 하수관거정비 시설공사(4차분)	2,045	‘07.02.27 ~12.26	1,901	-	-	△144	준공에 따른 물량정산	“
안덕2공구 하수관거정비 시설공사(4차분)	486	‘07.02.27 ~12.26	476	-	-	△10	“	“
성산1공구 하수관거정비 시설공사(4차분)	1,032	‘07.02.27 ~12.31	969	-	-	△63	“	“
성산2공구 하수관거정비 시설공사(4차분)	1,982	‘07.02.27 ~12.31	1,824	-	-	△158	“	“
산이수동 하수관거정비 시설공사	226	‘07.07.27 ~12.26	235	-	-	9	“	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
삼달2처리분구 하수관거 시설공사	563	‘07.09.03 ~’08.02.29	485	-	-	△78	“	하수도 관리부
난산처리분구 하수관거 시설공사	1,609	‘07.04.25 ~’08.02.24	1,524	-	-	△85	“	“
무릉평지동 농어촌마을하수도 개량공사	202	‘07.08.07 ~12.05	233	-	-	31	“	“
가시역지동 농어촌마을하수도 개량공사	184	‘07.08.09 ~12.05	191	-	-	7	“	“
서광서리 농어촌마을하수도 개량공사	183	‘07.08.09 ~12.08	186	-	-	3	“	“
제주시 영평동(성산교회) 오수관로 태풍나리피해복구공사	51	‘07. 12. 10 ~12. 27	72	-	-	21	현장실정반영 사업물량조정	“
삼수천 하류부 하수관거 태풍나리 피해복구 공사	42	‘07. 12. 11 ~‘08. 1. 9	52	-	-	10	현장실정반영 사업물량조정	“
조천지역 간이펌프장 전기판넬 복구공사	32	‘07. 12. 10 ~‘08. 1. 10	44	-	-	12	전기판넬 복구 개소 추가에 따른 물량 조정	“
구좌지역 간이펌프장 전기판넬 복구공사	26	‘07.12.10 ~‘08.1.10	35	-	-	9	전기판넬 복구 개소 추가에 따른 물량 조정	“
제주시 읍면지역 (한장동일원) 하수관거 정비공사	116	‘07.12.18 ~‘08.2.22	121	-	-	5	현장실정반영 사업물량조정	“
회수지구 하수관거 정비사업(2차분)	361	'07.3.5 ~'07.9.8	360	-	-	△1	준공에 따른 물량정산	“
월평동 하수도 정비공사	43	'07.6.20 ~'07.9.19	38	-	-	△5	“	“
대포동 하수도 시설공사	47	'06.11.20 ~'07.3.16	51	-	-	4	오수관로 추가부설(L=40m)	“
동홍택지지구내 하수관거 정비공사	237	'06.12.12 ~'07.5.25	250	-	-	13	준공에 따른 물량정산	“
삼성여고주변지역 하수관거 정비공사	221	'06.12.13 ~'07.5.23	232	-	-	11	“	“
대천동 하수관거 정비공사	305	'06.12.5 ~'07.5.25	269	-	-	△36	“	“
하원법화사로 하수관거 정비공사	79	'06.12.4 ~'07.5.28	77	-	-	△2	“	“
천서동 하수관거 정비공사	283	'06.12.7 ~'07.5.30	319	-	-	36	노견유실에 따른 전석쌓기 보강	“
상예지구 하수관거 정비공사	676	'06.12.12 ~'07.8.7	667	-	-	△9	준공에 따른 수량정산	“
보목하수처리장 고도처리 시설공사	517	'07.1.24 ~6.23	532	-	-	15	준공에 따른 물량 정산	“
보목하수처리장 고도처리시설 전기공사	46	'07.1.24 ~6.23	42	-	-	△4	“	“
상예우남지구 하수관거정비사업(1차분)	811	‘07.06.1 ~’08.1.31	590	-	-	△221	노선연장 감소	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
예래중동지구 하수관거정비사업(1차분)	906	‘07.6.1 ~‘08.1.31	735	-	-	△171	노선연장 감소	하수도 관리부
색달지구 하수관거정비사업(1차분)	534	‘07.5.25 ~12.24	531	-	-	△3	준공에 따른 물량 정산	“
서호호근지구 하수관거정비사업(1차분)	1,379	‘07.5.28 ~‘08.2.28	1,035	-	-	△344	노선연장 감소	“
토평지구 하수관거 정비사업(1차분)	1,669	‘07.5.28 ~‘08.2.28	1,608	-	-	△61	준공에 따른 물량 정산	“
법호촌지구 하수관거정비사업(1차분)	390	‘07.5.21 ~12.20	342	-	-	△48	“	“
동상효지구 하수관거정비사업(1차분)	1,050	‘07.5.29 ~‘08.1.28	992	-	-	△58	“	“
하효지구 하수관거정비사업(1차분)	213	‘07.10.17 ~‘08.2.16	121	-	-	△92	“	“
보목지구 하수관거정비사업(1차분)	335	‘’07.10.16 ~‘08.2.15	268	-	-	△67	“	“
토평지구 (반석빌라) 하수관거 정비공사	342	‘07.9.21 ~‘08.2.20	314	-	-	△28	“	“
신시가지 하수관거 정비공사	122	‘07.9.21 ~‘08.2.17	125	-	-	3	준공에 따른 물량 정산	“
호근지수 하수관거 정비공사	121	‘07.9.21 ~‘08.2.20	109	-	-	△12	“	“
도순앞동산길하수관거시설공사	63	‘07.10.31 ~‘08.2.7	61	-	-	△2	“	“
표선지구 광역상수관로 연계공사 전체	1,306	‘06.04.12 ~‘07.04.11	1,303			▵3	실제 시공물량 정산	수자원 개발부
남원지구 광역상수관로 연계공사	1,119	‘07.03.20 ~‘08.01.17	1,111			▵8	실제 시공물량 정산	“
조천지구 광역상수관로 연계공사	1,430	‘07.11.12 ~‘08.11.11	1,418	1,277		▵153	실제 시공물량 정산	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 전기공사 장전계통 전체3회	1,217	‘04.10.25 ~‘08.12.31	1,245			28	물가변동으로 인한 계약금액조정	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 전기공사 서광계통 전체3회	767	‘04.10.15 ~‘07.12.15	780			13	물가변동으로 인한 계약금액 조정	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 전기공사 회수계통 전체2회	507	‘04.10.15 ~‘07.12.15	516			9	물가변동으로 인한 계약금액 조정	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 전기공사 장전계통 전체4회	1,245	‘04.12.25 ~‘07.12.15	1,283			38	시공물량증가	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 전기공사 서광계통 전체4회	780	‘04.10.15 ~‘07.12.15	849			69	시공물량증가	“
제주도(Ⅱ)광역상수도 사업 전기공사 회수계통 전체3회	517	‘04.10.15 ~‘07.12.15	535			18	시공물량증가	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
한경면 한원리 마을안 상수도 노후관 교체공사	186	‘07. 2. 22 ~ 5. 22	182			△4	암물량 및 커터물량 정산	제주지역사업소
애월읍 신엄리 마을안 상수도 노후관 교체공사	208	‘07. 2. 28 ~ 5. 28	212			4	암물량 및 커터물량 정산 인도(소형고압블럭)철거 및 복구 물량 정산	“
한림읍 명월리 마을안 상수도 노후관 교체공사	128	‘07. 4. 30 ~ 6. 18	132			4	암물량 및 커터물량 정산 포장복구 실제시공물량 정산	“
조천읍 신촌리 마을안 상수도 노후관 교체공사	209	‘07. 5. 14 ~ 8. 9	207			△2	암물량 및 커터물량 정산	“
애월읍 금성리 마을안 상수도 노후관 교체공사	265	‘07. 5. 16 ~ 8. 9	275			10	암물량 및 커터물량 정산 포장복구 실제시공물량 정산	“
우도면 서광리 마을안 상수도 노후관 교체공사	48	‘07. 6. 15 ~ 7.24	47			△1	실제시공연장 정산	“
구좌읍 하도리 마을안 상수도 노후관 교체공사	86	‘07. 6. 7 ~ 7. 26	83			△3	암물량 및 커터물량 정산	“
애월읍 신엄리(성도그린) 상수도관 확장공사	50	‘07. 4. 19 ~ 5. 18	51			△1	커터물량 및 확장연장 정산	“
한림읍 귀덕2리 마을안 상수도 노후관 교체공사	28	‘07. 6. 18 ~ 7. 16	27			△1	커터물량 정산	“
구좌읍 동복리 급수관 신설공사	66	‘07. 7. 4 ~ 8. 2	65			△1	암물량 및 커터물량 정산	“
구좌읍 상덕천 급수관 신설공사	82	‘07. 7. 20 ~ 8. 17	79			△3	암물량 및 커터물량 정산	“
구,세무서 서측 외 1개소 노후관교체공사	38	‘07. 4. 18 ~ 7. 9	39			1	포장구간 증가 및 개인급수관 증가 정산	“
오라동 오라로타리 서측 배수관시설공사	225	‘07. 4. 19 ~ 8. 21	239			14	연장증가 및 포장물량 증가 정산	“
노형동 광평마을 남측 배수관시설공사	112	‘07. 4. 25 ~ 8. 2	109			▵3	실제 시공물량 정산	“
아라동 대원마을 노후관교체공사	141	‘07. 5. 4 ~ 8. 30	144			3	공사연장 증가 및 개인급수관 증가 정산	“
노형뉴월드마트북측주변 노후관교체공사	233	‘07. 5. 16 ~ 10. 11	217			▵16	실제 시공물량 정산	“
노형E마트동측주변 노후관교체공사	293	‘07. 6. 1 ~ 9. 20	283			▵10	실제 시공물량 정산	“
삼도1동 중앙여중북측 주변 노후관교체공사	114	‘07. 7. 2 ~ 10. 4	116			2	연장증가 및 암물량 발생증가 정산	“
삼도1동 전농로,서사로주변 노후관교체공사	185	‘07. 7. 2 ~ 10. 29	193			8	포장구간증가 및 암물량 발생증가 정산	“
구좌읍 평대리 중동 마을안 상수도 노후관 교체공사	112	‘07. 8. 2 ~ 10 .10	111			△1	암물량 정산, 제수변 추가 1개소	“

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
용강마을회관 남측 노후관교체공사	58	‘07. 8. 10 ~ 10. 19	56			▵2	실제 시공물량 정산	제주지역사업소
조천읍 선흘1리 마을안 상수도 노후관 교체공사	197	‘07. 8. 13 ~ 11 .8	227			30	태풍(NARI) 피해로 인한 인도 유실부분 추가 복구	“
외도동 신산마을 노후관 교체공사	267	‘07. 9. 14 ~ 12. 24	283			16	덧씌우기 물량증가	“
한경면 산양리 마을안 상수도 노후관 교체공사	322	‘07. 9. 27 ~ 12. 24	325			3	제수밸브 및 포장거푸집 추가시설	“
한림읍 상대리 마을안 상수도 노후관 교체공사	365	‘07. 10,18 ~ 12. 20	308			△57	제수밸브정비 개소수의 감소에 따른 정산	“
화북2동 부록마을 상수도관 태풍피해 복구공사	114.1	‘07. 12. 17 ~ ‘08.3.14	114.0			△0.1	실제시공에 맞추어 정산 변경	“
애월읍 장전,고성지구 상수도 태풍피해 복구공사	138.5	‘07. 12. 17 ~ ‘08.2.22	138.2			△0.3	실제시공 물량정산	“
아라동 제주어린이집 상수도관 태풍피해 복구공사	54	‘07. 12. 14 ~ ‘08.2.11	53			△1	암물량 감소 및 당초보다 일부 공종 감소 정산 변경	“
애월읍 금성,곽지지구 상수도관 태풍피해 복구공사	86.4	‘07. 12. 17 ~ ‘08.2.14	86.1			△0.3	암물량 정산, 커터물량 정산, 소화전 1개소 설치	“
애월읍 어음,봉성지구 상수도관 태풍피해 복구공사	36	‘07. 12. 19 ~ ‘08.1.17	33			△3	실제시공 물량정산	“
아라동 춘강맞은편 금천원주변 상수도관 태풍피해 복구공사	18.8	‘07. 12. 5 ~ ‘08.1.18	18.5			△0.3	실제시공에 맞추어 정산 변경	“
화북2동 황세왓 태고원 입구 상수도관 태풍피해 복구공사	14.2	‘07. 12. 5 ~ ‘08.1.9	14.0			△0.2	실제시공에 맞추어 정산 변경	“
영평동 신성여중옆 상수도관 태풍피해 복구공사	16.9	‘07. 12. 5 ~ ‘08.1.11	16.6			△0.3	실제시공에 맞추어 정산 변경	“
화북2동 황세왓 신도교길 상수도관 태풍피해복구공사	12.7	‘07. 12. 6 ~ 12. 26	12.5			△0.2	실제시공에 맞추어 정산 변경	“
화북주공아파트 북서측 하수관거 정비공사	167	‘07. 7. 16 ~ 10. 13	165			△2	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
신제주 순복음교회 남측 하수관거 정비공사	261	‘07. 7. 19 ~ 10. 16	257			△4	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
도남 우리마트동측 하수도 정비공사	13	‘07. 9. 21 ~ 10. 20	8			△5	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
노형대림아파트 동측 하수관거 정비공사	40	‘07. 9. 27 ~ 11. 15	55			15	펌프시설을 유지관리부서에서 일괄 관리하고 있는 방식으로 변경	“

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
신풍리 배수관 시설공사	78	‘07.02.26 ~6.25	77			△1	암반 물량 정산	서귀포지역사업소
가시리 노후상수도관 교체공사	32	‘07.02.28 ~6.27	34			2	관로연장 증가 및 보험료 정산	“
무릉2리 노후상수도관 교체공사	35	‘07.03.19 ~6.10	34			△1	암반 물량 정산 및 보험료 정산	“
세화리 노후 상수도관 교체공사	57	‘07.03.19 ~07.16	64			7	관로연장 추가 및 암반 물량 정산	“
상모리배수관시설공사	71	‘07.06.01 ~8.29	69			△2	암반 물량 정산	“
안덕 대정간(12호선) 확포장구간 상수도관 이설공사	228	‘07.06.14 ~‘08.01.06	293			65	국도 확포장 구간 배수관 이설 설계에 반영	“
한남리 노후 상수도관 교체공사	29.7	‘07.04.05 ~6.27	29.6			△0.1	암반 물량 정산	“
신흥1·2리 노후관 교체공사	193	‘07.09.27 ~12.29	196			3	개인전 4개소 추가 설치	“
남원1리 광지동 배수관 시설공사	75	‘07.05.04 ~7.30	89			14	관로 연장 증가 및 계량기 이설 추가	“
중문배수지 구간 상수도 노후관 교체공사	70	‘07.03.26 ~6.18	68			△2	암반 물량 정산	“
도순배수지 구간 상수도 노후관 교체공사	39.5	‘07.03.23 ~5.21	39.2			△0.3	암반 물량 정산	“
대포 약천사길 상수도 노후관 교체공사	43.5	‘07.04.09 ~7.07	43.4			△0.1	암반 물량 정산	“
상효북문 상수도 노후관 교체공사	43.5	‘07.06.25 ~8.23	43.3			△0.2	보험료 정산 조정	“
동홍동 상수도 노후관 교체공사	34	‘07.07.06 ~9.03	35			1	암반 물량 정산	“
대천동사무소 및 상수도 노후관 교체공사	34.7	‘07.08.06 ~10.04	34.5			△0.2	보험료 정산 조정	“
중문,도순,대포 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리 용역	7	‘07.04.05 ~6.03	6			△1	폐기물량 감소	“
상수도 누수처 수리공사(동부지구)	9	‘07.09.28 ~12.26	5			△4	누수처 수리 건수 변경	“
상수도 누수처 수리공사(구시가지)	9	‘07.09.28 ~12.26	11			2	누수처 수리 신규 발생에 따른 추가 시공	“

❏ 2008년도

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
제11호 태풍‘나리’내습에따른 어승생수원 피해복구사업	1,680	08.1.4 ~08.10.31	1,950			270	전석쌓기 증가 1,166㎡→2,472㎡(증1,306㎡) 모노레일설치 1,260m 도수관로 확장235m (Ø400~800m/m) → 351m(Ø800~1,000m/m)	상수도 관리부
어승생동부간선 돌문화박물관 노후 송수관로 교체공사	76.2	08.8.8 ~08.10.5	75.7			△0.5	노후관로교체물량일부조정△123m(당초390m→267m), 터파 기 암 발생(189㎥)	“
어승생송수관로동부지선(어승생저수지-노루생이)노후관 교체공사	450	08.4.24 ~08.10.23	543			93	사업물량 증가 간선:1720m→1759m 지선연결:0m→140m	“
강정정수장 취수틀 태풍피해 복구공사	41	08.4.28 ~08.6.27	50			9	강정정수장 하상에 설치하여 부유물을 차단하는 철망을 고장력 크로셔 스크린철망으로 변경	“
조천지선 광역상수도 연계공사	256	08.2.25 ~08.8.23	249			7	암반선 실측결과에 의한 암물량 정산, 실제 시공물량 조정	“
신촌지구 광역상수도 연계공사	215	08.2.25 ~08.7.25	213			2	보조기층 운반거리 조정, 아스콘복구 정산, 실제 시공물량 조정	“
안덕~대정간 도로확장 및 포장구간 하수관거 정비공사	308	‘08.04.28 ~’08.07.27	238	-	-	△70	준공에 따른 물량정산	하수도 관리부
신산리 하수관거 정비공사	19	‘08.06.03 ~’08.09.03	22	-	-	3	“	“
제주하수처리장 수질원격감시체계(TMS) 구매설치	273	‘08.3.14 ~‘08.6.30	271	-	-	△ 2	당초설계보다 공사물량 증감 발생	“
태풍나리 피해복구 추자면 분뇨처리장 시설공사	255	‘08.6.11 ~‘08.116.8	268	-	-	13	토공 및 관로추가부설에 따른 공사물량 증감발생	“
태풍나리복구 추자면 분뇨처리장 전기공사	29	‘08.7.8 ~’08.11.5	32	-	-	3	전기인입 거리변동에 따른 공사물량 증감발생	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(1공구)	12,520	‘07. 8. 24 ~‘10. 8. 23	12,509	12,582	-	62	ESC 및 현장실정반영 사업물량조정	“
제주시 동지역 하수관거 정비공사(2공구)	13,524	‘07. 8. 24 ~‘10. 8. 23	13,513	13,626	-	102	“	“
추자 묵리 오수관로 시설공사	392	‘08. 3. 10 ~‘08. 7. 7	371	-	-	△21	준공에 따른 물량 정산	“
우도 천진리 농어촌 주거환경개선공사	445	‘07. 12. 28 ~‘08. 6. 27	444	-	-	△1	“	“
걸매공원일원 하수관거 시설공사	68	‘07.12.20 ~‘08.4.15	67	-	-	△1	“	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
동홍동(굴왓모루) 하수관거 시설공사	76	‘07.12.20 ~‘08.5.17	87	-	-	11	준공에 따른 물량 정산	하수도 관리부
상예우남지구 하수관거정비사업(2차분)	507	‘08.2.20 ~‘08.10.19	485	-	-	△22	“	“
예래중동지구 하수관거정비사업(2차분)	676	‘08.2.18 ~09.2.17	708	-	-	32	물가상승분 반영	“
색달지구 하수관거정비사업(2차분)	414	‘08.2.20 ~08.7.19	376	-	-	△38	준공에 따른 물량 정산	“
서호호근지구 하수관거정비사업(2차분)	868	‘08.3.4 ~‘08.11.3	864	-	-	△4	“	“
토평지구 하수관거 정비사업(2차분)	696	‘08.3.4 ~‘08.11.3	729	-	-	33	물가상승분 반영	“
법호촌지구 하수관거 정비사업(2차분)	296	‘08.2.12 ~08.7.11	292	-	-	△4	준공에 따른 물량 정산	“
동상효지구 하수관거 정비사업(2차분)	759	‘08.2.12 ~‘09.2.11	793	-	-	34	물가상승분 반영	“
하효지구 하수관거정비사업(2차분)	297	‘08.3.4 ~08.7.3	278	-	-	△19	준공에 따른 물량 정산	“
보목지구 하수관거정비사업(2차분)	401	‘08.2.21 ~08.8.20	456	-	-	55	“	“
애월지구 광역상수관로 연계공사 전체	246	‘08.3.14 ~9. 2	224			△22	실제 시공물량 정산	수자원 개발부
구좌읍 상덕천 상수도 노후관 교체공사	127.8	‘08. 3. 4 ~ 5. 1	127.5			△0.3	암물량 정산감, 노후관 추가 시공, 제수변 6개추가	제주지역사업소
조천읍 교래리 급수취약지구 상수도관로 신설공사	55	‘08. 4. 10 ~ 5. 10	53			△2	암물량 정산	“
동문파출소~동문로타리간 노후관 교체공사	73	‘08. 3. 31 ~ 5. 28	75			2	포장 및 암 물량 증가 정산 변경	“
한경면 조수1리 마을안 상수도 노후관 교체공사	164	‘08. 4. 3 ~ 5. 30	163			△1	암물량 정산	“
코스모스호텔 서측주변 노후관 교체공사	182	‘08. 3. 4 ~ 6. 12	179			△2	암물량 전무 및 일부공종 감소로 정산 변경	“
조천읍 신촌리 상수도 급수관 확장공사	95.8	‘08. 4. 17 ~ 6. 20	95.5			△0.3	암물량 정산감, PE관 추가(34m), 포장물량 증, 주철관 접합부속 추가, 제수변 1개 증	“
한림읍 금능리 상수도 노후관 교체공사	166	‘08. 3. 26 ~ 6. 23	165			△1	암물량 정산 감, 제수밸브 1개소 증, 인도포장 증	“
구송림각 주변 노후관 교체공사	142	‘08. 3. 7 ~ 6. 13	137			△5	암물량 전무 및 일부공종 감소로 정산변경	“
구오라동사무소 동측외 5개소 노후관 교체공사	47	‘08. 4. 1４ ~ 7. 21	46			△1	민원처리 긴급공사로서 실제시공에 맞추어 정산변경	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
난지농업연구소~연북로간 노후관 교체공사	57	‘08. 4. 23 ~ 7. 21	56			△1	일부공종 감소로 실제시공에 맞추어 정산 변경	제주지역사업소
애월읍 고내리 상수도 노후관 교체공사	214	‘08. 5. 2 ~ 7. 29	213			△1	암물량 정산 감, 개인전 추가 3개소	“
도남초등학교 주변 노후관 교체공사	176	‘08. 5. 6 ~ 8. 1	179			3	일부공종 증가로 실제시공에 맞추어 정산변경	“
조천읍 함덕리 상수도 노후관 교체공사	198	‘08. 5. 23 ~ 10. 16	194			△4	암물량 정산	“
아라교서측 ~ 구산마을간 노후관 교체공사	38	‘08. 6. 2 ~ 9. 9	37			△1	민원처리 긴급공사로서 실제시공에 맞추어 정산변경	“
한림읍 귀덕3리 급수취약지구 노후관 교체공사	52	‘08. 6. 23 ~ 7. 23	58			6	제수밸브 추가 신설	“
한경면 청수리 상수도 노후관 교체공사	236	‘08. 6. 24 ~ 9. 10	234			△2	암물량 정산, 차선도색 증	“
염통배수지 북측 배수관 이설공사	26	‘08. 6. 24 ~ 7. 18	25			△1	실제 굴착확인한 관로연장감소 및 배관구간 자재 정산	“
오라정수장 서측외 15개소 노후관 교체공사	50.2	‘08. 7. 1 ~ 9. 9	49.9			△0.3	민원처리 공사로 실제시공에 맞추어 정산변경	“
연북로~보건소간 배수관 시설공사	174	‘08. 3. 27 ~ 7. 3	193			19	교량에 관 매달기 설계를 하상으로 설계변경에 따른 암반굴착 및 관 보호 콘크리트 타설로 변경	“
누수탐사지점 누수 수리 공사	9.6	‘08. 7. 17 ~ 10. 9	9.2			△0.4	민원발생지점 긴급공사로 실제 시공에 맞추어 정산변경	“
일도1동외 2개지역 누수 탐사지점 누수수리공사	9.8	‘08. 7. 28 ~ 10 .22	9.7			△0.1	민원발생지점 긴급공사로 실제 시공에 맞추어 정산 변경	“
오라동 삼우식당 북측 주변 노후관 교체공사	42.8	‘08. 8. 13 ~ 11. 10	42.5			△0.3	당초 전구간 포장으로 설계 굴착 확인한 바 일부노견 포장으로 정산변경	“
이도2동 3개지역 누수 탐사지점 누수수리공사	9.6	‘08. 8. 19 ~ 11. 16	9.4			△0.2	민원발생 지점 긴급공사 실제 시공에 맞추어 정산 변경	“
일도2동 서해아파트일원 하수도 정비공사	50	‘08. 6. 13 ~ 8. 22	61	62		12	관로교체 연장증가 및 지역주민건의로 인한 포장물량증가	“
동광초등학교일원 하수도 정비공사	52	‘08. 6. 16 ~ 8. 12	72			20	사면안정성 확보에 따른 간이 흙막이 추가시설	“
삼양원당봉일원 하수도 정비공사	38	‘08. 6. 16 ~ 8. 25	37			△1	현장실정에 따른 시공물량 정산	“

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업 기간	설계변경			증 감	변경사유	비고
			1차	2차	3차
연동 국민은행앞 하수도 정비공사	69	‘08. 6. 18 ~ 9. 16	68			△1	실현장실정에 따른 시공물량 정산	제주지역사업소
오라동 정실마을일원 하수도 정비공사	150	‘08. 7. 4 ~ 11. 1	144			△6	현장실정에 따른 시공물량 정산	“
신천리 노후관 교체	15	‘08.02.21 ~4.20	16			1	노후관 추가발생으로 관로 연장 증가	서귀포지역사업소
신풍리 노후관 교체	31	‘08.03.03 ~5. 1	32			1	콘크리트 포장복구의 거푸집 물량 증가	“
성산포(섭지코지) 배수관 시설공사	155	‘08.02.19 ~5.14	171			16	노선추가 및 암반 물량 정산	“
수산리 노후관 교체	95	‘08.02.22 ~6.20	88			△7	암반 물량 정산	“
가시리 노후관 교체	32.1	‘08.03.25 ~6.22	31.7			△0.4	암반 물량 정산	“
신양리 노후관 교체	29	‘08.04.07 ~7. 5	310			2	관로 연장 증가	“
신례리 노후관 교체	126	‘08.03.04 ~7. 1	142			16	포장깨기 물량 증가 및 계량기이설 23개소 추가	“
신도리 노후관 교체	59	‘08.04.30 ~7.28	55			△4	하수도 공사에 따른 아스콘 포장복구물량 제외	“
의귀리 노후관 교체	136	‘08.07.11 ~10. 8	144			8	관로추가시공 및 개인전 제수밸브추가시공	“
구억리 노후관 교체	31	‘08.08.25 ~10.23	30			△1	암반 물량 정산	“
보목동 상수도 노후관 교체공사	34	‘08.08.13 ~11.10	39			5	상수도 관로 추가 시공	“
보목동 상수도 노후관 교체공사 폐기물처리	2	‘08.08.27 ~10.25	3			1	폐기물량 증가	“
호근배수지 구간 상수도 노후관 교체공사	74	‘08.06.30 ~10.27	71			△3	관로 변경에 따른 포장복구 물량 조정	“
호근배수지 구간 폐기물처리 용역	2	‘08.07.18 ~11. 4	3			1	폐기물량 증가	“
상수도 누수처 수리공사(구시가지)	18	‘08.03.03 ~11.27	26			8	누수처 수리 신규 발생에 따른 추가 시공	“
상효배수지 남쪽 사유지 상수도관 이설공사	21	‘08.06.09 ~8. 7	22			1	암반 물량 정산	“
상수도 누수처 수리공사(동부지구)	18	‘08.01.29 ~7.26	19			1	누수처 수리 신규 발생에 따른 추가 시공	“
용흥동 상수도 노후관 교체공사	94	‘08.03.10 ~6. 7	93			△1	현지 여건 변동에 따른 물량 정산	“

15. 수의계약 현황 - 인쇄물 제외

❏ 2006년도

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
지하수폐공원상 복구공사	지하수폐공 원상 복구 9공	28,612	한국농촌공사 제주도본부	지방계약법시행령 제25조 제8호 아목 (사업대행기관과의 계약)	상하수도본부
제주하수처리장 전기설비 긴급공사	VSS 교체 1대 ATS 교체 1대 VSS 교체 1대	24,310	제남전기	지방계약법시행령 제25조 제1항 제1호 및 2호(긴급복구공사)	“
시가지내 요철제수변실 보수공사	요철제수변실인상 150개소	43,994	전진토건	지방계약법시행령 제25조4호마목 (특허공법에의한공사)	제주지역사업소
유수암리 상수도 노후관 교체공사용 관급자재 구입(PE)	PE관 D125~15mm L = 2,494m	20,782	한국프라스틱공업협동조합연합회	지방계약법시행령 제25조6호 다목 (단체수의계약)	“
송당리 상수도 이설공사용 관급자재 구입(PE)	PE관 D125~50mm L = 2,239m	31,231	한국프라스틱공업협동조합연합회	지방계약법시행령 제25조6호 다목 (단체수의계약)	“
하수도 악취차단 빗물받이 구입	멀티그레이팅 300EA	31,220	(주)마이즈텍	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항사목(실용신안등록물품구매)	“
동광성당외 시일원 하수도 비굴착 보수공사	하수도 L=526m	74,911	(주)용평건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(신기술지정에의한공사)	“
신사수마을회관 주변 하수관 이설공사	하수도 L=56m	26,238	(주)아름종합건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항나목(작업상 혼잡으로인한 수의계약)	“
회수마을회관 주변 상수도 노후관 교체	상수도 노후관 교체 L=2,007 D16~100mm	43,769	주왕건설(주)	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	서귀포지역사업소
웃법호촌 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,201 D20~50mm	23,680	(주)웅진건설	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	“

❏ 2007년도

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
추자 지하수 시설공사 상수도관구입	상수도관구입 (D200mm L=1,160m)	31,532	대산파이프(주)	지방계약법 시행령 제25조 제6호 마목 (농공단지 입주 공장 생산물품구매)	상하수도본부
상효~하효 지구광역상수도연계공사	배수관로 D200m/m,L=654m D100m/m,L=654m	82,230	(주)청도종합 건설	지방계약법 시행령 25조 4호 나목 (병행시공)	“
어승생 Y계곡 취수원 제11호(나리)태풍피해 응급복구공사	취수관로 연결 강관비계틀 설치	28,342	신천공무사	지방계약법 시행령 제25조 제2호 (긴급공사)	“
추자 지하수 개발공사	지하수 영향조사 1식 지하수개발 2공	108,602	한국농촌 공사제주도본부	지방계약법시행령 제25조 8호 다목 (특별법 설립 법인 사업)	“
제주도 광역상수도 3단계사업 연구용역	어승생 제2저수지 타당성 조사분석	45,540	국토연구원	지방계약법 시행령 제25조 제8호 다목 (특별법 설립 법인 사업)	“
행원1수원 전기시설 호우피해 복구공사	수배전반 정비 :1식 지하수기동반 정비:1식	21,929	정우전력	지방계약법 시행령 제25조 제2호(긴급공사)	“
행원1수원 전기시설 자동제어 설비 호우피해 복구용 자재	행원1수원 자동제어(계장)설비 호우피해 긴급복구용 자재	23,036	(주)대원계전산업	지방계약법 시행령 제25조 제2호(긴급공사)	“
예비용 수중모터펌프 제작 구입	수중모터펌프(380V/60HP/280m/960톤)외 16대	201,720	대한장애인복지회	지방계약법 시행령 제25조 제8호 바목 (장애인단체 생산 물품 구매)	“
동광양가압장 전기시설 태풍피해 긴급 복구공사	동광양가압장 수배전반 긴급복구 1식	24,918	(주)정우전력	지방계약법 시행령 제25조 제2호(긴급공사)	“
구좌지역 간이펌프장 전기판넬 복구공사	전기판넬 복구 1식	35,080	효성전력	지방계약법시행령 제23조제1항 제2호 (수해로인한응급복구공사)	“
조천지역 간이펌프장 전기판넬 복구공사	전기 판넬 복구 1식	44,680	효성전력	지방계약법시행령 제23조제1항제2호 (수해로인한응급복구공사)	“
삼수천 하류부 하수관거 태풍나리 피해복구공사	오수관 교체 L=95m 등	63,690	신광종합 건설	지방계약법시행령 제23조제1항제2호 (수해로인한응급복구공사)	“
제주시 영평동 성산교회 오수관로 태풍 나리피해복구공사	오수관 복구 L=370m등	101,145	태웅종합 건설	지방계약법시행령 제23조제1항제2호 (수해로인한응급복구공사)	“
조천지역 간이펌프장 통합제어판넬 복구공사	통합제어시스템 1식	35,960	광명전기	지방계약법시행령 제23조제1항제2호 (수해로인한응급복구공사)	“
보목하수종말처리장 고도처리시설설치공사	고도처리 20,000㎥/일	517,841	효성에바라 엔지니어링 기문봉	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 마목 (특허공법)	“

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
화북펌프장 수중모터펌프구입	모터펌프 1식	49,950	삼진공업	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	상하수도본부
간이펌프장 예비수중 펌프구입	펌프 23대	48,935	명신기계	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
간이펌프장 예비수중 펌프구입	펌프 15대	27,411	장우정밀	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
중문동부펌프장 수중펌프구입	펌프 1식	66.000	금정공업(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 사목 (실용신안등록물품구매)	“
도두펌프장 수중펌프 제작구입	수중펌프 1식	77,215	삼진공업	지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
병문중계펌프장 태풍 나리피해복구자동 제어반제작	자동제어반 1식	198,320	엘지전자	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
제주시 농어촌마을 하수도개선사업 실시설계용역	개량 8개소 정비 1식	37,400	(주)상아엔지니어링	지방계약법시행령 제26조 (유찰에 의한 수의계약)	“
제주시 동부 및 서부분뇨처리장 기술진단 용역	동부 및 서부분뇨처리장 기술진단	70,000	환경관리공단	지방계약법시행령 제25조제1항제8호아목 (대행기관과의 계약)	“
애월읍 금성리 마을안 상수도 노후관 교체공사용 관급자재 구입(PE)	PE관 D125~15mm L = 9,149m	24,358	대산파이프(주)	지방계약법시행령 제25조6호 마목 (농공단지입주업체)	제주지역사업소
일도2동 미화아파트앞 노후관 교체공사	D=50㎜ L=300M	33,780	(주)정도건설	지방계약법시행령 제25조1호 (긴급공사)	“
시가지내 요철제수변실 보수공사	요철제수변실인상 203개소	58,000	전진토건	지방계약법시행령 제25조4호마목 (특허공법에의한공사)	“
동여중동측 하수도 비굴착 부분보수공사	하수도 L=100m	33,387	(주)용평건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(신기술지정에의한공사)	“
용담로타리 서측외 시일원 불량맨홀 정비공사	맨홀정비 60EA	41,153	전진토건	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(신기술지정에의한공사)	“
영락교회 서측 하수도 비굴착 부분 보수공사	하수도 L=551m	76,274	(주)용평건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(신기술지정에의한공사)	“
중소기업센터 및 신천지아파트일원 하수도 비굴착 보수공사	하수도 L=1,267m	82,275	(주)용평건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(신기술지정에의한공사)	“
거북이 주유소 앞외 시일원 불량맨홀 정비공사	맨홀정비 106개소	75,623	전진토건	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(특허기술에의한공사)	“

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
제주학생문화원 일원 하수도비굴착 보수공사	하수도 L=343m	78,772	(주)동신엔지니어링	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(신기술지정에의한공사)	제주지역사업소
제주대 입구 ~도남 e편한세상APT간 하수도 비굴착 보수공사	하수도 L=1,798m	32,001	(주)동신엔지니어링	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(신기술지정에의한공사)	“
월평동 중앙고 일원 오수관로 태풍 나리피해 복구공사	하수도 L=67.5m	42,075	서부건설(주)	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조2항,4항나목(재해복구 및 동일현장)	“
남주고 진입로 상수도 노후관 교체공사	상수도 노후관 교체L=938 D16~100mm	38,764	영일건설(주)	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	서귀포지역사업소
수산1리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체L=3,424 D16~150mm	75,856	영륭종합건설(주)	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	“
동일1리 노후 상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,427 D16~75mm	25,146	신도종합건설(주)	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	“
안덕·대정 국도12호선 구간 상수도관 이설	상수도관 이설 L=6,585 D32~350mm	228,283	(주)남경산업	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	“
안덕·대정 국도95호선 구간 상수도관 이설	상수도관 이설 L=3,428 D50~350mm	152,779	삼진건설(주) 외 2	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	“
신산리 노후상수도관 교체공사	상수도 노후관 교체 L=1,743 D16~75mm	37,829	영륭종합건설(주)	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	“
서호,호근 상수도 노후관 교체공사	노후관교체 L=1,701m D16~65mm	39,963	㈜유창건설	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	“
한라산식당북쪽상수도 노후관 교체공사	노후관교체 L=3,102m D16~100mm	56,087	민경건설㈜	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행공사)	“

❏ 2008년도

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	업 체 명	사 유	비 고
광역정수장 노후 자동화설비 교체설치	- 밧데리교체 설치(UPS용) : 5개소 - 밧데리교체 설치(조작반용) : 2개소 - 밧데리교체 설치(운영실용) : 2개소 - UPS 교체 설치 : 6개소	117,651	대한민국상이군경회	지방계약법 시행령 제25조 제8호 마목 (국가유공자 단체 생산 물품 구매)	상하수도본부
추자예초리 복류수 이용시설 증설공사	송수관로 (PE관 D=100mm, L=1,206.1m)	59,917	유창기업	지방계약법 시행령 제25조 제4호 라목 (특수지역 공사)	“
예비용 수중모터펌프 제작 구입	수중모터 16대, 수중펌프 14대	231,192	대한장애인복지회	지방계약법 시행령 제25조 제8호 바목 (장애인단체 생산 물품 구매)	“
강정정수장 송배수관 이설공사	주철관 이설 D=500mm, L=372m, D=700mm, L=372m	80,643	(주)영도종합건설	지방계약법 시행령 제25조 제4호 나목 (병행시공)	“
신산리 하수관거 정비공사	하수관거 L=0.17km	21,863	유정건설(주)	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 나목 (병행시공)	“
호근위생처리장 원심분리탈수기 보수공사	원심분리탈수기 2대	36,202	(주)로얄정공	지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 바목 (당해 물품 제조설치한 자의 정비수리)	“
간이펌프장 수중모터 펌프구입	수중모터펌프 12대	25,256	명신기계	지방계약법시행령 제25조제1항 제4호 파목 (당해공급물품의 호환성)	“
조천읍 대흘1리 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~150mm L=860m	24,201	장원종합건설(주)	지방계약법시행령 제25조4호나목 (병행공사)	제주지역사업소
애월읍 광령1리 보행자 통행시설 정비공사장내 상수도 노후관 교체공사	노후관 교체(PE) D15mm~100mm L=577m	21,100	(주)대명토건	지방계약법시행령 제25조4호나목 (병행공사)	“
조천읍 신촌리 신와선 급수관 확장공사	주철 및PE관 부설 D15mm~200mm L=4,291m	138,844	(주)연방종합건설	지방계약법시행령 제25조4호나목 (병행공사)	“
오라동사무소 동측 배수관 이설공사	배수관시설 D150mm~400mm L=186m	38,912	전진종합건설(주)	지방계약법시행령 제25조4호나목 (병행공사)	“
한림읍 금악리 마을안 상수도 노후관 교체공사 (4본선)	노후관 교체(PE) D75mm~15mm L=3,264m	74,947	유성건설(주)	지방계약법시행령 제25조4호나목 (병행공사)	“
사라봉5거리외 시일원 하수도 비굴착 보수공사	하수도 L=141.5m	51,590	(주)용평건설	지방계약법제9조1항 및 동법시행령25조4항마목(신기술지정에의한공사)	“
서귀포시(동지역) 요철제수변정비공사	요철제수변정비 104개소	47,047	전진토건	지방계약법 시행령 제25조 제4호 마목 (특허공법에의한공사)	서귀포지역 사업소

16. 제주특별자치도의회의 부대조건(의견) 내용 이행상황

□ 부대조건(의견) 내용

ㅇ 제주특별자치도 하수도 사용조례 제정시 부대조건(제250회 임시회-‘08.6.24)

□ 제주시 및 서귀포시 동지역의 하수도 사용료를 단일화

□ 부대조건(의견) 추진상황

○ 하수도 요금 현황

구 분	원 가		요 금		현실화율 (%)
	총괄원가 (백만원)	단위원가 (톤/원)	사용료수입 (백만원)	평균단가 (톤/원)
계	52,950	1,138	12,553	270	23.7
제주시 동지역	28,100	781	10,213	284	36.4
서귀포시 동지역	11,594	1,286	2,067	229	17.8
서귀포시 읍면지역	13,256	8,706	273	179	2

※ 제주시 읍면지역 : 서귀포시 읍면지역 요율과 동일하게 08. 12월부터 하수도요금 부과

○ 추진상황

- 하수도정비 기본계획에 포함하여 하수도 요금 현실화 제고방안에 대한 용역을 ‘09.2월까지 완료예정임

- 하수도 요금 통합 방안

․ 도 전체 하수도 요금을 단일화 하는 안

․ 동지역, 읍면지역으로 구분하여 부과하는 안

․ 제주시, 서귀포시로 구분 또는 업종 통합안 등 장단점을 분석 검토중임

○ 향후계획

- 하수도요금 현실화율이 23.7%에 불과하여 ‘09년 상반기에 하수도 요금 현실화 및 단일화를 위한 하수도 사용 조례 개정추진

소   관   사   항

소  관  사  항

1. 지하수 (물)관리 종합대책 추진상황

ꏚ 제주도수자원종합개발계획 수립 시행

□ 계획수립 : 1993. 11

□ 계획기간 : 1993～ 2011

□ 주요내용

• 제주도 수자원의 체계적인 개발․공급

• 제주도 지하수자원의 합리적인 보전․관리

• 용수이용 합리화 및 대체수자원 확보

• 제주도 수자원 종합관리시스템 운영

• 수자원연구 개발체제 강화

• 제주도 지역 발전의 생산적 기반제공

□ 총강우량 : 3,427백만톤/년(100%)

□ 증발산량 : 1,138백만톤/년(33%)  • 직접유출량 : 708백만톤/년(20.7%)

□ 지하수함양량 : 1,581백만톤(46.1%)

□ 적정개발량 : 645백만톤/년(1,768톤/일) - 지하수함양량의 40.8%

※ 지하수 함양량 재평가 - 2002. 2 ～ 2003. 12(한국수자원공사)

□ 광역상수도 Ⅰ, Ⅱ단계 기본계획 구상

• 광역상수도 Ⅰ단계 준공 : 2000. 11. 30

• 광역상수도 Ⅱ단계 건설 추진 : 2002. ～ 2008.

ꏚ 농업용수종합계획 수립 - 2004. 2. 19

□ 근 거 : 제주특별자치도 특별법 제319조

□ 계획기간 : 2004 ～ 2016

□ 주요내용

• 농업용수 급수 대상지역 및 용수 수요량 분석

• 농업용수 공급 계획 및 대체 수자원 개발계획 수립

ꏚ 지하수관리계획 수립 - 2004. 11. 3

□ 계획기간 : 2004 ～ 2014

□ 주요내용

• 지하수 이용 및 관리실태      • 지하수 보전 및 관리계획

• 지하수 수질 관리계획        • 지하수 조사계획

ꏚ 향후 추진계획

□ Jeju Water Vision 2030 시행

• 계획기간 : 2010 ~ 2030(20년 장기계획)

• 사업개요

- 사업기간 : 2008 ～ 2009

- 사업주관 : 환경자원연구원 자체연구사업으로 추진

☞ 제주발전연구원ㆍ한국농촌공사 등 프로젝트팀 구성

• 주요내용

- 수자원관리종합계획, 농업용수종합계획, 지하수자원특별관리구역
관리계획 등을 통합한 종합계획으로 수립

⇒ 수자원관리종합계획 및 농업용수종합계획 등을 종합한 제주도 수자원 관련 최상위 계획으로서 수자원의 계획적ㆍ체계적 관리 기틀 마련으로 20년 후를 대비한 미래지향적 수자원행정 구현

2. 광역상수도(1, 2단계) 시설 가동현황(최근 3년간)

ꏚ 1단계 시설

(단위 : 톤/일)

시설별	시설 용량	2006년도		2007년도		2008년도 (10. 31현재)		급수구역
		공급량	가동율	공급량	가동율	공급량	가동율
5개소	135,000	57,200	43%	75,600	56%	74,771	55.4%
조천정수장	37,000	13,000	35.1%	17,600	47.6%	21,371	57.8%	조천읍, 일도동, 이도동
애월정수장	23,000	11,000	47.8%	12,000	52.2%	11,500	50.0%	연동, 노형, 애월읍 광령리
구좌정수장	19,000	4,600	24.2%	11,000	57.9%	13,000	68.4%	구좌읍, 조천읍 함덕,대흘,선흘
남원정수장	37,000	28,700	77.6%	31,000	83.8%	26,400	71.4%	남원읍, 표선면, 성산읍, 동․서홍동, 중앙동, 천지동
토평정수장	19,000	-	-	4,000	21.1%	2,500	13.2%	동․서홍동, 중앙동, 천지동 보충

ꏚ 2단계 시설

□ 광역상수도 2단계 시설(4개소)은 ‘08. 10. 31 현재 시공 중에 있음

□ 공정율 98%  (‘08. 12월 준공 예정)

※저지수원 및 금악수원은 제주시 대정읍 서림수원지 및 옹포수원지의 용출량 부족 대체를 위하여 ‘06. 10월 부터 일부 가동

□ 광역2단계 가동 현황

시설별	시설 용량	2006년도		2007년도		2008년도 (10. 31현재)		급수구역
		공급량	가동율	공급량	가동율	공급량	가동율
4개소	88,000	-	-	-	-	42,800	48.64%
금악정수장	32,000	-	-	-	-	10,300	32.2%	한경면, 한림읍
유수암정수장	7,500	-	-	-	-	4,500	60.0%	연동,노형, 아라동
서광정수장	32,500	-	-	-	-	24,000	73.9%	한림읍,한경면, 대정읍,안덕면 일부
회수정수장	16,000	-	-	-	-	4,000	25.0%	서귀포 동지역

3. 광역상수도(2단계) 건설사업 추진상황

◈ 동부지역의 Ⅰ단계사업 준공에 이어 서부지역의 Ⅱ단계 사업 추진으로 도 전역 광역용수 공급체계 구축

◈ 제주국제자유도시건설계획 등에 따른 기반시설 확충으로 안정적

용수공급 및 지역간 용수불균형 해소

ꏚ 사업개요

□ 총사업비 : 100,092백만원(국비 79,302 ․ 지방비 20,790)

□ 사업기간 : 2002 ～ 2008년

□ 위    치 : 도 서부지역 일원

□ 사업내용

▪ 시설용량 88천톤/일(지하수공 62공 ․ 정수장 4개소)

▪ 가 압 장 1개소(17천㎥/일)    ▪ 도․송수관로 94.3㎞(D=200～700㎜)

※ Ⅰ단계사업(135천톤/일) : 2000. 11월 완공

ꏅ '07까지 추진실적

□ 사 업 비 : 95,388백만원(국비 78,302 ․ 지방비 17,086)

□ 사업내용

▪ 수원시설 9개소(96천톤/일)  ▪ 정수장 4개소(88천톤/일)

▪ 가 압 장 1개소(17천㎥/일)      ▪ 도․송수관로 93.5㎞(D=200～700㎜)

ꏅ '08 마무리계획

□ 사 업 비 : 4,704백만원(국비 1,000 ․ 지방비 3,704)

□ 사업내용 : 관로0.76㎞, 감시정 7공, 중앙통제실 개선 등

ꏅ 향후계획

□ 연내 사업 마무리하여 안정적 광역상수도 공급 추진

4. 지하수관리특별회계 세입예산 편성현황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

구 분	계	세 입 내 역		비 고
2006년	-			미설치
2007년	15,819	․사용료 수입 ․수수료 수입 ․전입금 ․차입금 ․기타(잡수입)	6,232 46 2,428 7,000 113	지하수원수대금 지하수이용․변경허가 일반회계(균특) 광역상수도 지방비부담 관측정 이설 보상금
2008년	14,079	․사용료 수입 ․수수료 수입 ․국고보조금(균특) ․차입금 ․기타(잡수입)	7,000 19 2,100 4,900 60	지하수원수대금 지하수이용․변경허가 농어촌생활용수개발사업 광역상수도 지방비부담 정산금 수입

5. 어승생 제2저수지 건설사업 추진상황

◈ 중산간 지역의 유일한 상수원으로 이용하고 있는 기존 어승생 저수지 용량부족(10만톤)으로 가뭄시 빈번한 격일제 급수로 주민생활 불편초래

☞ 격일급수 : ‘94년(15일), ’96년(33일), ‘97년(21일), ’01년(16일), ‘07년(20일)

◈ 한라산Y계곡 용출량 1,244만톤중 월류되는 844만톤을 이용 중산간 지역의 근원적 물문제 해소

ꏅ 사업개요

□ 위    치 : 제주시 해안동 어승생저수지 상류

□ 사 업 비 : 48,000백만원(국비24,000 지방비24,000)

□ 사업기간 : 2007. 02 ～ 2011. 12(5년간)

□ 사업내용 : 저수시설 50만톤, 정수시설 1만톤, 도수관 5.89㎞, 송수관 5.97㎞

ꏅ '08까지 추진실적

□ 2007.  5. 17 : 지방재정 중앙투융자 심사 완료(행정자치부)

□ 2007. 12. 12 : 어승생 제2저수지건설 타당성 조사분석 연구용역(국토연구원)

□ 2007. 12. 19 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

□ 2008.  5. 13 : 기본계획 및 실시설계 용역착수(12개월)

ꏅ 향후 추진계획

□ 기본계획 및 실시설계 용역완료 : ‘09. 5. 9

▪사전환경성검토, 사전재해영향성검토, 자연공원행위허가 등 행정절차 이행

□ 어승생 제2저수지 건설사업 발주 : ‘09. 6월

▪사업비 : 40억원(국비20억원, 지방비 20억원)

▪사업량 : 도․송수관로 2.5km 및 저수지 토공

ꏅ 기대효과

□ 고지대 용천수의 효율적 활용 및 중산간지역 급수난 해소

□ 중산간지역 지하수 관정개발 억제로 지하수자원 보전관리 도모

□ 국제자유도시건설에 따른 용수수요에 탄력적으로 대처

6. 상수도 경영합리화 방안

ꏚ 추진개요

□ 수도사업의 자구노력(원가절감)을 통한 경영합리화 기반 구축

□ 연차적 유휴시설 정비, 무인화시스템, 태양광 발전으로 생산성 제고

ꏚ 추진 실적

□ 수도사업의 자구노력(원가절감)을 통한 경영합리화 기반 구축

∙´07년 결산결과 손실액이 통합 1년차 131억, 통합 2년차 55억으로, 76억이 경영수지 개선 등 통합에 따른 가시적 경영성과 창출

☞ 광역용수공급체계 전환에 따른 유휴시설정비로 원가절감 : 4,529백만원

※ ´07까지 : 지하수 37개소  광역  상수도  대체(1,220백만원)

※ ´08추진 : 용천수  1개소, 지하수 27개소 정비(3,309백만원)

☞ 무인화 시스템 구축 등 시설 현대화를 통한 인건비 절감 :   960백만원

※ ´07까지 : 가압장 2개소 무인화               -  6명 타 사업장 재배치(240백만원)

※ ´08추진 : 취수장 5개소, 가압장 1개소 무인화 - 18명 타 사업장 재배치(720백만원)

∙상수도 유휴시설 농업용으로 전환 활용(22개소)

☞ 광역상수도 공급체계 전환에 따라 지하수 개발비용 22억 절감

∙조천정수장 태양광 발전 시스템 구축으로 동력비 절감

☞ 연간 전력료 절감 효과 : 10백만원(136,800KWh, 조천정수장 동력비 10%)

ꏚ 향후 추진계획

❍ 광역상수도 공급체계 전환에 따른 지속적 유휴시설 정비

❍ 취수장 및 가압장 무인화시스템 구축 지속 추진

❍ 고유가 극복을 위한 에너지 절약 방안마련 추진

☞ 정수장 가동, 일부 심야시간대로 조정 동력비 절감

☞ 친환경에너지(태양광)시스템 단계적 구축으로 동력비 절감

7. 통합 상수도 경영합리화 사업 추진상황

◈ 통합 상수도 운영에 의한 규모의 경제 실현으로 생산원가 절감

◈ 효율적이고 새로운 시스템 운영을 통한 생산성 향상

1) 수도정비기본계획 수립

□ 목 적 : 통합 상수도시설에 대한 종합적인 정비계획을 수립하여 체계적인 시설확충 및 정비를 실시 상수도 통합 효과 극대화 및 예산의 효율적 집행 기여

□ 사업기간 : 2006. 12 ～ 2008. 5. 2

□ 사 업 비 : 698백만원

□ 추진실적 : 수도정비기본계획 수립

□ 사업의 주요내용

• 광역도시계획과 연계한 중장기 수도시설 확충 방안 수립

• 대체 수자원 개발계획 및 상수도 수질관리계획

• 경영체계의 개선 및 정보화 관리 등 운영관리 개선계획

• 광역상수도 공급 확대를 위한 수요조사 및 관망계획

• 광역상수도 대체공급에 따른 유휴시설의 활용방안

□ 계획기간 : 20년 (광역도시계획과 연계하여 계획 수립)

□ 추진상황 및 향후계획

• 2008. 7. 8 : 수도정비기본계획 승인 신청(환경부)

• 2008. 12월 중 승인 예정

• 승인후 기본계획에 의거 체계적인 수도정비 사업 시행

2) 유휴시설 정비 및 시설 현대화를 통한 경영합리화 추진

ꏅ 추진방침

□ 소규모 취수시설(마을상수도)을 광역상수도로 대체 유휴시설 정비를 통한 상수도 생산 원가 절감

□ 소규모 취․정수시설의 무인화로 인건비 절감

ꏅ 광역상수도 대체에 따른 유휴시설 정비

□ 정비방침

• 가급적 타용도로 전환 사용하여 시설 이용율 제고 및 시설비 절감

• 미사용 시설에 대하여는 폐공 등의 조치로 수질 보전 조치

□ 정비대상 - 75개소 (용천수 1개소, 지하수 74개소)

□ 추진실적 : 유휴 지하수 정비 65개소

• ‘07년 추진(37개소) : 농사용 전환 22, 수위관측공 3, 폐공 2, 전기사용휴지 10개소

• ‘08년 추진(28개소) : 용천수1, 지하수 27개소(농사용 전환 26, 전기사용휴지 1) 추진

□ 추진계획(‘09년) : 지하수 10개소

□ 기대 효과

• 유휴시설 정비에 따른 상수도 생산원가 절감 (45억원)

☞ 광역용수공급체계 전환에 따른 유휴시설정비로 원가절감 : 4,529백만원

※ ´07까지 : 지하수 37개소  광역  상수도  대체(1,220백만원)

※ ´08추진 : 용천수  1개소, 지하수 27개소 정비(3,309백만원)

• 상수도 유휴시설 농업용으로 전환(22개소) 활용으로 지하수 개발비용 절감 (22억원)

ꏅ 취․정수시설 무인화 추진

□ 추진방침

• 소규모 취․정수시설에 대한 무인화로 인건비 절감 및 원격 감시․제어 시스템 구축 등 수도시설 현대화 추진

□ 전체계획 : 가압장 3개소, 취수원 5개소

□ 추진실적 : 가압장 3개소 , 취수원 5개소 무인화 추진

• ‘07년 추진(2개소) : 가압장 2(용홍, 한림)개소 무인화 추진

• ‘08년 추진(6개소) : 가압장 1(동광양), 취수원 5(외도, 이호, 용담, 금산, 삼양1․2)

□ 사업효과

• 수도시설 무인화 및 원격제어에 따른 잉여 인력은 인력부족 사업장에 재배치, 근무 인력의 효율적 이용 및 인건비 절감( 24명, 960백만원)

☞ 무인화 시스템 구축 등 시설 현대화를 통한 인건비 절감 :   960백만원

※ ´07까지 : 가압장 2개소 무인화     -  6명 타 사업장 재배치(240백만원)

※ ´08추진 : 취수장 5개소, 가압장 1개소 무인화 - 18명 타 사업장 재배치(720백만원)

8. 지하수 인공함양정 설치사업 추진상황 및 효과분석

ꏅ 권장대상 인공함양정

□ 설치현황

∙ 근거 : 제주특별자치도 특별법 제316조 및 지하수관리 기본조례 제38조

∙ 대상 : 농ㆍ축ㆍ임ㆍ수산산업용 비닐하우스, 온실, 지붕면적이 넓은 공장ㆍ창고ㆍ학교ㆍ관람장ㆍ공공기관 청사 등

년도별	시설수 (개소)	함양계획량 (톤/년)	집수면적 (㎡)	보조금 (천원)	비 고
계	81	644,523	365,463	169,986
2001~2005	64	538,815	289,369	78,966
2006	4	22,680	18,222	19,800
2007	5	49,764	34,436	7,220
2008	8	33,264	23,436	64,000	시공중

※ 특별법 개정에 따라 2003년부터 보조금 지급

※ 함양계획량은 지역별 평균 강우량을 적용한 것임

□ 지하수 인공함양량 분석 (1년간 : ’07. 9 ~ ’08. 10)

구 분	계	남원지역	구서귀포시지역	서부지역 (애월ㆍ대정․한림)	동부지역 (성산․표선)
함양정수(공)	73	52	9	9	3
빗물집수면적(㎡)	342,027	214,881	32,477	74,521	20,148
강우량(mm)	-	2,474	2,347	1,370	2,155
함양량(㎥)	678,016	478,454	68,601	91,884	39,077

※ 연간 지하수 인공함양량 678천톤

《함양량 산정방법》

- 강우량(㎜) × 집수면적(㎡) × 0.9(집수계수) ÷ 1000 = 함양량(㎥)

※ 집수계수 : 하우스에 내리는 빗물의 90% 정도가 집수되는 것으로 산정함

9. 지하수관정 사후관리 민간위탁현황

ꏅ 2007년

사업명	위탁업체	관리대상공	위탁금액 (백만원)	사업기간	위탁업체 결정방법	위탁업체 면허소지	비고
제주시지역	(주)우성엔지니어링기술사사무소	지하수관정 300공	25	‘07.5.11 ～7.19	견적입찰	지하수영향조사업 지하수개발시공업 환경영향평가업 기술사사무소 등록
서귀포시 동부지역	(주)성광종합기술개발	지하수관정 300공	24	‘07.5.11 ～7.19	견적입찰	지하수개발시공감리 상수도건설업 철근콘크리트 측량업, 토목감리
서귀포시 서부지역	남천개발	지하수관정 400공	32	‘07.6.8 ～8.16	견적입찰	지하수영향조사업 지하수개발시공감리 지하수개발시공업 보링그라우팅공사 상하수도철콘공사

ꏅ 2008년(10월말 기준)

사업명	위탁업체	관리대상공	위탁금액 (백만원)	사업기간	위탁업체 결정방법	위탁업체 면허소지	비고
제주시지역	(주)청화산업개발	지하수관정 500공	42	‘08.5.20 ～7.28	견적입찰	지하수영향조사업 지하수개발시공업 상하수도설비공사 금속구조물창호공사
서귀포지역	남천개발	지하수관정 635공	50	‘08.8.19 ～10.27	견적입찰	지하수영향조사업 지하수개발시공감리 지하수개발시공업 보링그라우팅공사 상하수도철콘공사

10. 지방채 차입 및 상환실적

《상수도사업》

□ 2007년 결산기준

(단위:백만원)

기금명	차입년도	차입기간	차입금액	이자율	상환액	상환잔액
계			123,552		41,022	82,530
지역개발기금	2003	12년	12,000	3%, 4.5%고정	2,100	9,900
재특자금	1995~2006	15년	81,660	4.88%변동	22,321	59,339
재정자금	1987~2000	15년	8,020	5.38%변동	3,701	4,319
균특자금	1992~1995	15년	10,612	5%고정	8,699	1,913
환특자금	1996~2003	15년	7,061	4.38%변동	1,399	5,662
농어촌발전기금	1987~1991	20년	3,199	4.0%고정	2,802	397
금융기관	2006	15년	1,000	6.08%변동	0	1,000

□ 연도별 상환 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	원금	이자	비 고
합계	101,979	82,530	19,449
2008	12,726	8,917	3,809
2009	12,645	9,329	3,316
2010	12,714	9,881	2,833
2011	12,037	9,708	2,329
2012	10,979	9,122	1,857
2013	9,172	7,735	1,437
2014	7,591	6,496	1,095
2015	5,958	5,144	814
2016	4,900	4,310	590
2017 이 후	13,257	11,888	1,369

《 하수도사업 》

□ 2007년 결산기준

(단위:백만원)

기금명	차입년도	차입기간	차입금액	이자율	상환액	상환잔액
계			143,413		34,857	108,556
지역개발기금	1996~2007	15년	100,778	3~7%고정	18,801	81,977
재특자금	1995	15년	3,500	5.5%고정	2,450	1,050
공자기금	1999~2007	15년	19,300	5.44~5.45%고정 4.22%변동	3,700	15,600
환특자금	1996	15년	1,150	5%고정	691	459
농어촌발전기금	1988~1991	15년	1,500	4~4.5%고정	1,346	154
금융기관채	2006	15년	6,400	5.22~5.76%변동	-	6,400
해외채(OECF)	1989	25년	10,785	4.25%고정	7,869	2,916

□ 연도별 상환 계획

(단위 : 백만원)

구분	계	원금	이자	비고
합계	134,568	108,557	26,011
2008	9,860	5,671	4,189
2009	9,534	5,633	3,901
2010	11,540	7,997	3,543
2011	13,484	10,337	3,147
2012	14,394	11,720	2,674
2013	13,220	11,026	2,194
2014	12,137	10,360	1,777
2015	10,414	9,010	1,404
2016	8,408	7,310	1,098
2017 이 후	31,577	29,493	2,084

《 광역상수도 건설사업 》

□ 2007년 결산기준

(단위:백만원)

기 금 명	차입년도	차입기간	차입금액	이자율	상환액	상환잔액	비 고
계			17,136		0	17,136
재특자금	2005	15년	3,436	4.28%변동	0	3,436	광역상수도 2단계
지역개발기금	2006	15년	6,700	3.0%고정	0	6,700	광역상수도 2단계, 농어촌생활용수
지역개발기금	2007	15년	7,000	3.0%고정	0	7,000	광역상수도 2단계

□ 연도별 상환계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계			비 고
	계	원 금	이 자
합 계	23,004	17,136	5,868
2008	617	0	617
2009	617	0	617
2010	617	0	617
2011	961	344	617
2012	1,611	1,014	597
2013	2,270	1,714	556
2014	2,208	1,714	494
2015	2,147	1,714	433
2016	2,085	1,714	371
2017 이후	9,871	8,922	949

11. 상수원보호구역 주민지원사업 추진상황(최근 3년간)

ꏅ 보호구역 현황

□ 보호구역 수 : 13개소(제주 8, 서귀 5)

□ 보호구역면적 : 1,822천㎡(제주 1,551, 서귀 271)

- 공유지 : 1,000천㎡(55%),    - 사유지 : 822천㎡(45%)

□ 주거인구 :  4개소 199명(외도13, 금산147, 삼양35, 서림4)

ꏅ 주민지원사업 내역

연도별	사 업 명		사 업 량	사업비(천원)			비고
				계	국비	도(시)비
2006	계		부지매입 8,572㎡ 학자금지원 3명	232,600	69,780	162,820	국비30% 지방비 70%
	외도	부지매입	부지매입 8,572㎡	230,000	69,000	161,000
	삼양	학자금지원	학자금지원 3명	2,600	780	1,820
2007	계		부지매입 2,087㎡ 학자금지원 3명	471,759	141,527	330,232	“
	외도	부지매입	부지매입 1,577㎡	60,530	18,159	42,371
	금산	부지매입	부지매입 510㎡	409,878	122,963	286,915
	삼양	학자금지원	학자금지원 3명	1,351	405	946
2008	계		토지매입 1,319㎡ 외 4개사업	189,813	56,994	132,819	“
	외도	토지매입	토지매입 1,250㎡	63,253	19,026	44,227
		지장물철거	가설건축물 46.2㎡ 및 주변정비1,210㎡	4,500	1,350	3,150
	금산	토지매입	토지(건물)매입69㎡	96,985	29,095	67,890
	강정	휀스설치	휀스설치 140㎡	9,861	2,958	6,903
	5개 구역	환경정화 및 보호벽도색	외도, 삼양, 금산, 강정, 한림, 및 외도보호벽 650㎡	13,865	4,160	9,705
	삼양	학자금지원	3명(고2, 대1)	1,349	405	944

12. 정수장 및 취수장별 근무 인력 현황

정수장별	근무인력 현황					주요업무
	계	일반	기능	청원 경찰	무기 계약등
계	85	3	25	25	32
조천정수장	4	-	2	-	2	조천정수장 계통 운영
별도봉정수장 사라봉정수장 금산수원지	5	-	1	2	2	별도봉정수장 계통 운영 사라봉정수장 계통 운영 금산수원지 시설 운영
도련정수장	3	-	-	2	1	도련정수장 계통 운영
애월정수장	4	-	2	2	-	애월정수장 계통 운영
구좌정수장	3	-	1	-	2	구좌정수장 계통 운영
오라정수장 용담수원지	4	-	-	3	1	오라정수장 계통 운영 용담수원지 시설 운영
월산정수장	3	-	2	-	1	월산정수장 계통 운영
남원정수장	4	-	2	2	-	남원정수장 계통 운영
강정정수장 토평정수장 용흥가압장	16	1	2	1	12	강정정수장 계통 운영 토평정수장 계통 운영 가압장 운영
서광정수장	4	-	2	1	1	서광정수장 계통 운영
한림정수장 상대가압장	3	1	1	1	-	한림정수장 계통 운영 상대가압장 운영
삼양1,2수원지	3	-	1	2	-	삼양1,2수원지 시설 운영
외도수원지	2	-	1	1	-	외도수원지 시설 운영
삼양3수원지	1	-	-	1	-	삼양3수원지 시설 운영
이호수원지	2	-	1	-	1	이호수원지 시설 운영
어승생수원지	5	-	-	5	-	어승생수원지 시설 운영
동광양가압장	3	-	1	-	2	동광양가압장 시설 운영
유수암정수장	3	-	1	1	1	유수암정수장 계통 운영
금악정수장	2	-	1	-	1	금악정수장 계통 운영
회수정수장	3	1	-	-	2	회수정수장 계통 운영
추자담수장	3	-	2	1	-	추자담수장 계통 운영
우도담수장	3	-	2	-	1	우도담수장 계통 운영
가파도담수장	1	-	-	-	1	가파도담수장 계통 운영
마라도담수장	1	-	-	-	1	마라도담수장 계통 운영

13. 지하수 원수대 부과․징수현황(최근 3년간)

□ 총 괄

(단위 : 천원, 천톤)

구 분	사용량	부과액	징수액	미징수액	체납율
계	48,840	17,767,745	17,492,812	274,933	1.5%
2006년	18,463	6,585,140	6,539,104	46,036	0.7%
2007년	17,691	6,224,488	6,138,055	86,433	1.3%
2008년9월	12,686	4,958,117	4,815,653	142,464	2.8%

□ 업종별 부과현황

(단위 : 천원, 천톤)

구 분	2006년			2007년			2008년 9월
	사용량	부과액	징수액	사용량	부과액	징수액	사용량	부과액	징수액
계	18,463	6,585,140	6,539,104	17,691	6,224,488	6,138,055	12,686	4,958,117	4,815,653
가 정 용	1,603	170,257	168,417	1,543	163,932	160,876	1,123	119,272	120,035
영 업 용	8,895	2,097,456	2,054,924	8,479	2,005,288	1,944,290	6,090	1,452,873	1,294,606
골프장 및 온천	4,794	2,991,445	2,990,829	4,751	2,733,243	2,716,733	3,190	1,619,423	1,627,295
공장 및 제조업	2,107	398,394	397,346	2,077	390,270	385,142	1,649	367,035	374,894
비영업용	481	66,151	66,151	367	31,610	30,869	265	21,955	21,264
먹는샘물	583	861,437	861,437	474	900,145	900,145	369	1,377,559	1,377,559

□ 체납자에 대한 조치사항

∙ 가산금 부과 : 1,372건․12백만원

∙ 압류조치 : 4건․132백만원

∙ 매월 고지서 교부시 납부독촉장 발부 및 방문 징수독려 월1회 이상

14. 용천수 정비사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

구 분	정비대상	사업비	사업기간	정 비 내 용	비 고
2006년	-
2007년	-
2008년	돔뱅이물	45	‘08.5~’08.7	․용천수 진입로 정비 ․용천수 목재계단 설치 ․편의시설(사각정자) 설치 ․용천수 주변 조경수목 식재	서귀포시 예례동

15. 빗물이용시설 설치 지원사업 현황(최근 3년간)

ꏅ 권장대상 빗물이용시설

□ 설치현황

∙ 근거 : 제주특별자치도 특별법 제316조 및 지하수관리 기본조례 제37조 및 제41조

∙ 대상 : 농ㆍ축ㆍ임ㆍ수산산업용 비닐하우스, 온실, 지붕면적이 넓은 공장ㆍ창고ㆍ학교ㆍ관람장ㆍ공공기관 청사 등

시설 년도	시 설 위 치	시설규모 (저류용량) (㎥)	연간이용 계획량 (㎥)	집수 면적 (㎡)	용도	사업비 (천원)	보조금 (천원)
계	16개소	2,172	90,684	69,121		326,851	220,530
2006 (1)	소 계	100	12,777	6,700		20,000	7,750
	조천읍 조천리 2-2	100	12,777	6,700	농업	20,000	7,750
2007 (5)	소 계	872	17,807	14,220		105,958	62,780
	애월읍 봉성리 3554	72	2,453	2,148	농업	18,500	12,950
	제주시 영평동 1371	500	2,677	1,650	농업	21,400	13,000
	제주시 오라2동 1442-1	100	2,972	4,392	농업	20,000	13,000
	애월읍 소길리 산51 (주)요석산업	100	179	130	공업	29,700	13,000
	조천읍 조천리 2426	100	9,526	5,900	농업	16,358	10,830
2008 (10)	소 계	1,200	60,100	48,201		200,893	150,000
	애월읍 납읍리 527-3	100	12,830	11,239	농업	19,470	15,000
	애월읍 봉성리 2886	100	4,900	4,297	농업	20,000	15,000
	서귀포시 강정동 275	100	5,520	3,300	농업	20,000	15,000
	표선면 토산리 1570-1	100	6,600	3,600	농업	21,300	15,000
	조천읍 대흘리 308	200	6,930	4,297	농업	20,123	15,000
	제주시 봉개동 2698	100	8,040	4,958	농업	20,000	15,000
	한경면 낙천리 955	200	5,170	8,260	농업	20,000	15,000
	대정읍 동일리 666	100	3,780	3,300	농업	20,000	15,000
	구좌읍 행원리 506	100	2,480	1,650	농업	20,000	15,000
	제주시 도련동2동 350	100	3,850	3,300	농업	20,000	15,000

□ 설치효과

∙ 대체수자원인 빗물을 효율적 활용으로 농업용 지하수 이용량 감소

∙ 비닐하우스 주변 농경지 및 도로 침수 예방

16. 골프장 등 관광개발사업지 지하수 개발․이용허가현황

ꏅ 골프장

□ 지하수 개발․이용허가 현황                            (2008. 9. 30 기준)

구분	골프장명	사업체		홀 수		지하수개발 이용허가량
		업체명	대표	회원	대중	공수	개발량(㎥/일)	허가량 (㎥/일)
합 계		32개소		639	180	113	69,977	59,109
운영중	소 계	26개소		540	144	92	57,727	46,976
	오라CC	오라관광(주)	김부경	36	-	4	5,060	3,115
	제주CC	(주)제주cc	백일선	18	9	3	3,290	2,148
	중문GC	한국관광공사	이창규	18	-	5	2,982	1,690
	캐슬렉스제주GC	(주)캐슬렉스제주	최세환	18	9	4	2,000	1,316
	크라운CC	(재)관정이종환	박용태	18	9	3	2,800	2,567
	핀크스GC	(주)핀 크 스	김홍주	18	9	8	4,563	3,580
	해비치CC	해비치리조트(주)	오성훈	27	9	4	3,100	2,480
	나인브릿지CC	CJ개발(주)	김운용	18	9	3	2,800	2,240
	레이크힐스CC	(주)레이크힐스	서병오	27	-	4	2,200	1,760
	봉개프라자	한화국토개발(주)	홍원기	-	9	1	600	500
	라온GC	라온레저개발(주)	박택동	27	-	3	1,950	1,800
	엘리시안CC	LG건설(주)	조이석	27	9	5	2,690	2,144
	스카이힐 제주CC	(주)호텔롯데	이승훈	27	9	6	3,090	2,472
	로드랜드CC	(주)로드랜드	김양옥	27	-	3	2,200	1,833
	블랙스톤	(주)블랙스톤	원기룡	18	9	4	2,000	2,000
	수농	(주)수농	박찬수	-	18	1	602	400
	사이프러스	제주리조트(주)	김진형	27	9	3	2,000	1,600
	제피로스GC	제피로스(주)	이정식	18	-	3	1,500	1,500
	에버리스CC	신안관광(주)	오원석	18	9	5	2,500	2,500
	라헨느	라헨느리조트(주)	민영호	18	9	3	1,400	1,300
	한라산	(주)부건	김용덕1	18	-	3	1,500	1,500
	테디벨리	(주)제이에스개발	전인학	18		2	1,000	766
	세인트포	(주)에니스	김정욱	36	-	2	1,000	1,000
	부영CC	남광건설산업(주)	최병영	27	9	5	2,800	2,800
	우리들메디칼	(주)웰니스우리들	김수경1	18	-	3	1,400	1,265
	더 클래식	(주)호원	임동준	18	-	2	700	700
승인	소계	6개소		99	36	21	12,250	12,133
	오라관광지구	유일개발(주)외2	최재암2	18	-	9	5,350	5,350
	이어도CC	이어도cc(주)	양철홍	18	18	3	1,800	1,733
	그랑블 제주	하이랜드(주)	황선근	18	-	2	1,000	1,000
	재릉관광지구	보훈복지의료공단	김하경	-	18	1	500	500
	비치힐리조트	(주)더원	백동기	27	-	4	2,400	2,400
	스프링데일	(주)동국개발	강국창	18	-	2	1,200	1,150

□ 지하수 원수대 부과현황

(단위 : 톤, 천원)

골프장명	2006		2007		2008. 9
	이용량	원수대	이용량	원수대	이용량	원수대
계	4,617,011	2,934,869	4,711,549	2,719,923	3,153,262	1,612,081
오 라CC	338,260	275,063	302,840	210,156	216,770	152,598
제 주CC	261,412	178,607	264,337	197,491	56,897	17,435
중 문GC	240,830	136,578	212,033	102,422	148,657	68,468
캐슬렉스제주GC	211,302	108,570	217,377	111,000	165,774	86,047
크라운CC	264,907	147,716	252,092	128,971	177,687	90,350
핀크스GC	249,984	142,557	303,210	186,755	203,644	112,740
해비치CC	216,054	112,023	289,137	185,379	202,101	131,699
나인브릿지CC	96,473	34,549	103,088	34,328	75,364	23,968
레이크힐스CC	109,977	47,778	124,628	59,269	106,099	49,090
봉개프라자	40,575	9,138	40,522	10,460	24,526	6,299
라온GC	319,021	231,083	236,063	128,854	146,585	84,043
엘리시안CC	210,156	109,513	249,763	139,202	203,856	118,329
스카이힐 제주CC	297,218	254,725	361,275	284,341	262,999	192,112
로드랜드CC	161,414	75,628	135,008	57,063	99,797	40,744
블랙스톤	331,474	234,268	299,446	176,204	187,532	97,767
수농	65,904	17,878	60,458	15,335	33,127	8,841
사이프러스	150,949	75,273	148,982	60,523	86,940	32,049
제피로스GC	303,527	189,779	152,787	75,976	68,604	22,687
에버리스CC	468,745	448,247	416,683	319,004	173,000	87,306
제주라헨느	67,326	23,226	168,519	77,356	132,184	53,888
한라산 CC	-	-	82,832	37,464	45,353	10,613
테디벨리	57,911	17,582	171,693	81,753	54,415	15,705
부영CC	153,592	65,088	50,581	12,593	29,146	6,300
세인트 포	-	-	-	-	16,265	7,326
우리들메디칼	-	-	42,805	14,171	85,249	35,823
더 클래식	-	-	25,390	13,853	70,347	25,113
그랑블 제주	-	-	-	-	80,344	34,741

ꏅ 관광개발사업

□ 지하수 개발․이용허가 현황

구분	관광개발사업	대 표 자		소 재 지	면적 (천㎡)	지하수개발 이용허가량
						공수	개발량(㎥/일)	허가량(㎥/일)
계		6개소			4,037	9	2,534	2,417
운영중	소 계	4개소			1,630	7	2,279	2,192
	동양썬라이즈 리조트(함덕)	(주)디와이		조천 함덕 274	465	2	300	300
	제주돌문화공원	제주특별자치도		조천 교래 산 19	970	1	500	485
	남원관광지	1차	한주흥산(주)	남원 남원 1408	101	1	149	77
		2차	(주)금호산업 제주리조트	남원 남원 2384-1	100	2	900	900
	미천굴관광지	(주)삼영관광		성산 삼달 1010	95	1	430	430
사업승인	소 계	2개소			2,407	2	255	225
	세화․송당 온천관광지	제주온천지구 도시개발사업조합 (주)제주온천		구좌 송당 1461-1	2,363	1	105	105
	제주토이파크 관광농원	제주토이파크		안덕면 동광리 383	44	1	150	120

□ 지하수 원수대 부과현황

(단위 : 톤, 천원)

구분	관광개발사업	2006		2007		2008. 9
		이용량	원수대	이용량	원수대	이용량	원수대
계		111,952	22,730	167,964	38,158	160,123	38,341
운영중	소 계	111,952	22,526	167,964	37,954	160,123	38,188
	동양썬라이즈 리조트	61,058	14,675	60,766	13,988	54,448	12,964
	제주돌문화공원	7,111	1,072	-	-	-	-
	금호제주리조트	15,161	2,031	53,109	12,576	60,023	15,342
	미천굴관광지	28,622	4,748	54,089	11,390	45,652	9,882
사업승인	소 계	-	204	-	204	-	153
	제주온천	-	204	-	204	-	153

17. 공동주택 및 대형건축물 등 전용수도관리 및 수질검사 실적 및 조치현황(최근 3년간)

ꏅ 인가현황

□ 근거 : 수도법 제52조 및 시행령 제58조

□ 대상 : 기숙사 ㆍ사택ㆍ 시설등 급수인구 100인 이상 5,000인 이내

구 분	계	학교	병원	숙박	공동주택	일반건물	골프장	비고
계	155	5	6	58	43	26	17
제 주 시	119	4	6	42	39	17	11
서귀포시	36	1	-	16	4	9	6

ꏅ 연도별 수질검사 실적 및 조치결과

년도	분기	수질검사대상			검 사 결 과		수질 부적합에 대한 조치결과
		시설수	검사제외 휴지ㆍ폐지	검사대상	적 합	부적합	재검사후 적합판정	폐지	휴지
총 계		1,765	64	1,701	1,648	53	49	3	1
2006	계	658	30	628	602	26	25	1	-
	1/4	164	6	158	146	12	11	1	-
	2/4	163	6	157	153	4	4	-	-
	3/4	164	10	154	146	8	8	-	-
	4/4	167	8	159	157	2	2	-	-
2007	계	640	22	618	600	18	15	2	1
	1/4	165	10	155	151	4	4	-	-
	2/4	160	6	154	152	2	1	-	1
	3/4	158	3	155	147	8	6	2
	4/4	157	3	154	150	4	4	-	-
2008	계	467	12	455	446	9	9	-	-
	1/4	157	6	151	148	3	3	-	-
	2/4	155	3	152	148	4	4	-	-
	3/4	155	3	152	150	2	2	-	-

18. 빗물이용시설 현황 및 빗물이용 실적(최근 3년간)

ꏅ 빗물이용시설 현황

(단위 : 천톤)

골프장별	빗물이용시설		빗 물 이 용 량
	저류지 (개소)	저수 용량	2006년(14개소)				2007년도(19개소)				2008년 9월말 현재(21개소)
			계	지하수	빗 물	이용률 (%)	계	지하수	빗 물	이용률 (%)	계	지하수	빗 물	이용률 (%)
합 계	158	2,835	6,380	2,650	3,730	58.5	9,038	3,470	5,568	61.6	6,192	2,535	3,657	59.1
핀크스	8	67	675	261	414	61.3	746	307	439	58.9	489	221	268	54.9
레이크힐스	4	153	261	105	156	59.8	291	142	149	51.4	214	106	108	50.6
스카이힐	10	151	958	345	613	64.0	1,090	351	739	67.8	796	272	524	65.9
캐슬렉스	11	123	612	226	386	63.1	455	221	234	51.4	326	171	155	47.5
나인브릿지	8	102	265	98	167	62.8	303	104	199	65.7	221	84	137	62.1
엘리시안	11	236	659	227	432	65.6	607	234	373	61.4	470	228	242	51.4
로드랜드	11	70	390	151	239	61.3	392	140	252	64.3	309	117	192	62.0
라온	6	106	610	328	282	46.2	440	231	209	47.5	338	186	152	44.9
해비치	7	113	435	216	219	50.4	499	289	210	42.1	368	215	153	41.6
크라운	13	92	304	187	117	38.4	306	173	133	43.5	198	111	87	44.0
봉개프라자	2	113	122	36	86	70.5	229	45	184	80.4	108	27	81	74.9
블랙스톤	5	177	756	308	448	59.2	1,156	303	853	73.8	606	183	423	69.7
샤인빌	4	45	109	66	43	39.4	132	62	70	52.8	83	40	43	51.3
제피로스	6	228	224	96	128	57.0	550	142	408	74.2	315	64	251	79.8
사이프로스	14	250	-	-	-	-	563	123	440	78.1	287	79	208	72.5
에버리스	6	107	-	-	-	-	586	332	254	43.3	334	163	171	51.1
라헨느	3	140	-	-	-	-	413	174	239	57.9	290	118	172	59.4
한라산	7	77	-	-	-	-	161	56	105	65.1	137	52	85	61.9
테디벨리	9	150	-	-	-	-	119	41	78	65.4	130	61	69	53.0
부영	10	160	-	-	-	-	-	-	-	-	102	19	83	81.2
세인트 포	3	175	-	-	-	-	-	-	-	-	71	18	53	74.9

19. 급수불량지역 해소 추진상황

ꏅ 급수불량지역 해소사업 추진현황

구 분	‘07실적	‘08추진	‘09이후
사 업 량	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 44.5km	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 30.6km	∙송․배․급수관 확장및 신설 L= 29.3km
사 업 비	2,497백만원	2,373백만원	8,102백만원
수혜지역	27개 동․리	20개 동․리	20개 동․리

ꏅ ‘09이후 급수불량지역 현황

구분	취약지역	원인	해소대책	사업비	비고
계	16개 지구		배수관시설 L=29.3km	8,102
소 계	13개지구		배수관시설 L=18.3km	3,262
제 주 시	영락교회주변	물다량 이용시기 일시적 수압저하	배수관시설 L= 1,200m	270	'09계획
	금천마을 및 목석원 주변		배수관시설 L= 300m	180	'09계획
	회천동 배수관 시설		배수관시설 L= 1,100m	250	'09계획
	선덕어린이집 주변		배수관시설 L= 500m	100	'10계획
	용담이동 용해로 및 용화로주변		배수관 시설 L = 600m	180	'10계획
	삼성 초등학교 주변		배수관시설 L= 1,000m	230	'10계획
	한국병원 북측주변		배수관시설 L= 1,400m	322	'10계획
	한림읍 월림~월령간		배수관시설 L= 3,000m	300	'09계획
	구좌읍 하도리		배수관시설 L= 1,000m	100	'09계획
	우도면 오봉리 하고수동 농협 앞~해수욕장입구		배수관시설 L= 700m	70	'09계획
	조천읍 대흘리 고평동~와산경계		배수관시설 L= 4,000m	600	'10계획
	구좌읍 종달리		배수관시설 L= 2,800m	560	'10계획
	한경면 고산리		배수관시설 L= 700m	100	'10계획
소 계	3개지구		배수관시설 L=11.0km	4,840
서귀포시	색달동 지역	물다량 이용시기 일시적 수압저하	광역상수도 연결 L=3,000m	840	‘09계획
	성산읍 신양,성산리 지역		광역상수도 연결 L=6,000m	2,000	‘10계획
	회수지역		배수지 확장 5,000톤 광역상수도 연결 L=2,000m	2,000	'11년이후

20. 도서지역 식수원 개발사업 추진 실적

❍ 도서지역 생활수준 향상 및 매년 증가하는 관광객 편익 증진을위한 급수환경의 체계적이고 획기적인 개선

❍ 해저상수도․담수화시설․고도정수처리시설 등 도서지역별 특성을

고려한 상수도시설 현대화로 안정적인 공급기반 구축

ꏅ 추진개요

❍ 추자도 : 유효저수량 추가 증대 및 수질개선을 위한 정수처리시설 확충

∙원수다원화로 저수량 증대〈연간 190천톤□376천톤〉

- 지하수 54천톤, 묵리복류수 72천톤, 제4저수지 도수로정비 50천톤, 예초리 복류수 증설 10천톤

∙담수화시설 확충 : 1,000톤 ⇒ 2,000톤(25억원, ‘10년~’11년)

∙제3저수지 정수처리시설 : 2,000톤(35억원, ‘11년~’12년)

❍ 우도 : 관광객 증가에 대비한 해저상수도시설 확충

∙담수화시설 노후, 유지관리비 과다 및 고장시 대체 공급시설 전무

∙급격한 관광객 증가로 2010년에는 물 부족문제 발생

- 급수인구 : 주민 1,726명(연간 관광객 ‘07년 520천명 → ’11년 700천명)

☞ 2010년 1일 500톤, 2015년 1,000톤 부족 발생

∙해저상수도 : 관로13.3㎞(육상 10.2, 해상 3.1), 배수지 2,050톤, 100억(‘08년~’10년)

❍ 마라도 : 관광객 증가에 대비한 담수화시설 증량

∙담수화 시설 및 배수지 증설 : 7억원(국비 4.9, 지방비 2.1) - ‘09년

- 담수화시설 증설 : 25톤/일(50톤→75톤), 배수지 증설 50톤/1지

※비양도, 가파도는 향후 6~7년간 물부족 문제 없음

ꏅ 추진실적

❍ 묵리 복류수 시설 및 예초리 복류수 증설공사 추진(‘07~’08년, 17억)

❍ 우도 해저상수도 시설사업(2,000백만원)

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : ‘08. 4 ~ 11

❍ 가파도 배수지 개량 사업 추진(200톤, 10백만원) : ‘08. 7월

ꏅ 추진계획

❍ 추자 담수화시설 확충 및 고도정수처리시설 설치 : ‘10년～’12년

❍ 우도 해저상수도시설 관로공사 발주 : ‘08. 12월

❍ 마라도 담수화시설 및 배수지 증설 실시설계 : ‘09. 3월

ꏅ 기대효과

□ 도서지역의 열악한 급수환경을 개선하여 지역주민 생활불편 해소

□ 섬을 찾는 관광객의 물 부족 문제 해결로 관광활성화 도모

21. 물절약 운동 추진사업 및 실적

【상하수도본부】

ꏚ 물 절약 홍보 캠페인 전개

□ 제16회 세계 물의 날 사전 행사 추진

• 일시 및 장소 : 2008. 3. 21(금) 08:00~09:00 시내 5개 지역

• 참석인원 : 상하수도본부 직원 30명(홍보현수막, 어깨띠, 전단지 배포)

□ 제16회 세계 물의 날 행사 개최

• 일시 및 장소 : 2008. 3. 21(금) 상하수도본부 광장

• 참석인원 : 도민, 도지사, 도의원, 유관기관 및 단체, 학생 등 200명

ꏅ 초등학생을 대상으로 물 사랑 및 절약 홍보

□ 물사랑 및 절약 생활화 포스터․산문 공모(‘08. 2. 20 ~ 3. 10)

• 대  상 : 도내 전 지역 초등학생

• 주  제 : 물의 소중함과 중요성에 대한 인식 제고 내용

※ 우수작품 포스터 12명(‘09 달력 제작), 산문 12명

□ 환경학교 물 관련 교육 : 절물자연휴양림 11개교 820명(‘08. 5 ~ 10)

ꏚ『물사랑․물절약』운동 홍보물 제작

□ 물절약 홍보 스티커 2만장, 리플릿 4천부

• 초등․중학교, 교육청, 도서관, 읍․면․동사무소 등 320개소

□ 도서지역 담수시설 안내책자 6천부, 홍보배너 인터넷신문 5개 매체

□『물사랑․물절약』동영상 10분 분량 DVD 제작 (‘08. 12월 완료)

ꏚ 기  타

□ 물사랑 자원봉사단 운영 (34회, 138가구)

•독거노인 등 어려운 가구 선정 수도․전기수리, 청소, 도배 등 지원

【서귀포시 여성단체협의회】- 협의회 구성 : 8개 단체, 회원수 3,145명

ꏚ『물사랑․물□냥』실천운동 추진

□ “제주 청정물 지킴이” 서명운동(‘08. 3. 24 ~ 10. 24, 서명 1만명)

• 행사시 친환경수세미, EM비누 나눠주기 등

□ 『물사랑․물□냥』홍보물 배부 : 리플렛 1천부, 스티커 3천부 등

□ 어린이날 등 행사시『물사랑․물□냥』풍선 나눠주기 등

□ 우도 담수장, 삼다수 생산공장 등 물절약 홍보관련 견학

□ 서귀포 칠십리 축제『물사랑․물□냥』홍보관 운영(‘08. 10. 23 ~ 10. 26)

22. 상수도 누수율 현황(최근 3년간)

(단위 : %)

시․도별	2005년도		2006년도		2007년도		비고
	유수율	누수율	유수율	누수율	유수율	누수율
제주특별자치도	73.5	15.2	73.6	15.1	76.7	15.0
서울특별시	85.6	10.1	89.9	9.8	91.4	6.3
부산광역시	80.9	13.1	83.1	12.2	85.6	10.2
대구광역시	84.3	12.4	82.9	13.7	84.2	12.3
인천광역시	76.6	16.4	78.1	17.2	81.6	13.8
광주광역시	80.0	8.8	81.4	8.7	81.7	9.0
대전광역시	80.1	11.4	84.9	10.9	86.2	9.7
울산광역시	77.0	16.8	79.6	15.8	80.9	14.5
경 기 도	85.8	8.9	86.0	8.6	86.7	8.6
강 원 도	63.0	24.3	65.1	23.6	65.9	22.2
충청북도	77.6	11.8	79.4	11.7	79.6	10.9
충청남도	72.2	16.1	69.9	18.8	71.4	18.5
전라북도	60.9	25.0	63.3	26.6	63.1	23.2
전라남도	64.3	24.3	64.4	25.8	64.8	25.3
경상북도	67.9	29.8	67.1	22.3	65.9	22.6
경상남도	61.1	24.8	64.0	24.5	64.8	24.0
전국평균유수율	79.3		80.0		81.0
전국평균누수율	14.1		14.2		12.8
유 수 율	전국최고 : 경기도 전국최저 : 전라북도		전국최고 : 서울특별시 전국최저 : 전라북도		전국최고 : 서울특별시 전국최저 : 전라북도
누 수 율	전국최고 : 경상북도 전국최저 : 광주광역시		전국최고 : 전라북도 전국최저 : 경기도		전국최고 : 전라남도 전국최저 : 서울특별시

※ 2007년도 통계치는 ‘07. 10. 31 현재 미확정된 공표되지 않은 수치 임

23. 누수방지사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

행정시별	사업명	2006년도		2007년도		2008년도		비고
		사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비
계	합 계		8,829		7,751		9,246
	노후관교체	162.7㎞	7,715	142.3㎞	6,877	121.4km	8,467
	계량기교체	10,047개소	715	6,503개소	419	7,493개소	479
	누수탐사	850㎞	399	646㎞	455	442.5km	300
제주시	소 계		6,621		5,014		5,702
	노후관교체	110㎞	5,715	85.8㎞	4,302	82.4km	5,236
	계량기교체	7,037개소	509	4,038개소	287	4,241개소	286
	누수탐사	825㎞	397	626㎞	425	300km	180
서귀포시	소 계		2,208		2,737		3,544
	노후관교체	52.7㎞	2,000	56.5㎞	2,575	39km	3,231
	계량기교체	3,010개소	206	2,465개소	132	3,252개소	193
	누수탐사	25km	2	20㎞	30	142.5km	120

24. 맑은 물 공급을 위한 사업 추진상황(최근 3년간)

(단위 : 백만원)

구 분	2006년도		2007년도		2008년도		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	6개사업	13,247	6개사업	13,882	6개사업	14,440
노후관교체사업	162.7㎞	7,715	142.3㎞	6,877	121.4km	8,467
누수탐사	850㎞	399	646㎞	455	442.5km	300
노후계량기 교체	10,047 개소	715	6,503 개소	419	7,493 개소	479
취.정수시설 개선사업	시설물 정비1식	1,280	시설물 정비1식	1,522	시설물 정비1식	1,475
광역상수도 관로 연결사업	배수지 2지 관로 7.6km	2,905	배수지 2지 관로 7.7km	4,137	배수지 1지 관로 6.95km	3,529
상수도 보호구역 정비	부지매입 8,572㎡ 학자금지원 3명	233	부지매입 2,087㎡ 학자금지원 3명	472	부지매입 1,319㎡ 학자금지원 3명	190

25. 먹는물 및 지하수 수질검사 수수료 수입현황(최근 3년간)

ꏚ 2006년

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	1,028	113	88	21	775	0	31
수수료	125,841	7,484	22,594	3,165	90,844	0	1,754

ꏚ 2007년

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	3,632	158	107	20	2,888	112	347
수수료	385,370	10,397	27,400	3,012	332,836	3,717	8,008

ꏚ 2008년(‘08. 10. 31 기준)

(단위 : 건, 천원)

구 분	계	전용수도 (원수포함)	먹는물	생활용수	농어업용수	저수조	기타	비고
건 수	2,499	357	202	609	173	190	968
수수료	231,096	24,405	51,655	89,070	18,944	5,723	41,299

26. 일반회계 전입금 현황

❏ 상수도

(단위 : 백만원)

연도별	전입금	부족재원내역	비 고
합 계	13,200
2007	6,200	∙상수도통합에 따른 요금인하분 보전 : 5,400 ∙상수도 필수경비 부족재원 충당 : 800
2008	7,000	∙상수도통합에 따른 요금인하분 보전 : 5,400 ∙상수도 필수경비 부족재원 충당 : 1,600

❏ 하수도

(단위 : 백만원)

연도별	전입금	부족재원내역	비 고
합 계	10,306
2006	1,054	∙지하시설물 도 전산화사업 500백만원, 하수도사업 운영지원 500백만원, 하수슬러지 자원화사업 54백만원 일반회계 재원에서 충당
2007	4,561	∙국고보조사업인 고도처리시설사업4,305백만원, 하수슬러지 처리시설사업 256백만원 일반회계 재원에서 충당
2008	4,691	∙국고보조사업인 고도처리시설사업4,006백만원, 하수슬러지 처리시설사업 685백만원 일반회계 재원에서 충당

27. 상수도 사용료 감면현황(2007, 2008년)

❏ 2007년도

(단위 : 천원)

구 분	감 면 금 액	감면율	감면사유
합 계	379,824
학교급식시설	295,996	30%	수도급수조례 제39조제1항
사회복지시설	29,948	〃	″
선박급수시설	53,880	〃	″

❏ 2008년도(10월말기준)

(단위 : 천원)

구 분	감 면 금 액	감면율	감면사유
합 계	368,309
학교급식시설	279,678	30%	수도급수조례 제39조제1항
사회복지시설	26,230	〃	″
선박급수시설	43,667	〃	″
휴양펜션업	18,734	“	“

28. 지하수 개발․이용허가 현황

ꏚ 총괄현황(2007. 12. 31 기준)

(단위 : 천톤/일)

구 분		계	생활용	농업용	공업용	먹는샘물제조용	기타․ 조사관측용
계	공 수	4,941 (100％)	1,351 (27.3％)	3,312 (67.0％)	162 (3.3％)	4 (0.1％)	112 (2.3％)
	개발량	1,709 (100％)	622 (36.4％)	1,037 (60.7％)	45 (2.6％)	5 (0.3％)	- (0.0％)
공공	공 수	1,193	324	759	2	3	105
	개발량	1,041	372	664	1	4	-
사설	공 수	3,748	1,027	2,553	160	1	7
	개발량	668	250	373	44	1	-

※ 염지하수 1,144공 7,915천톤/일 제외

ꏚ 연도별허가현황

(단위 : 공, ㎥/일)

구 분		합 계	담수지하수			염지하수
			소 계	준 공	미준공	소 계	준 공	미준공
합 계	공 수	187	126	68	58	61	53	8
	허가량	685,250	626,15	34,845	27,770	622,635	561,135	61,500
2006	공 수	83	48	44	4	35	35	-
	허가량	433,679	32,305	29,705	2,600	401,374	401,374	-
2007	공 수	58	43	22	21	15	15	-
	허가량	150,771	15,010	2,940	12,070	135,761	135,761	-
2008	공 수	46	35	2	33	11	3	8
	허가량	100,800	15,300	2,200	13,100	85,500	24,000	61,500

ꏚ 미 준공 사유 및 조치

구 분		공수	사유 및 조치
합 계		66
공공	소 계	40
	생활용	1	붉은오름 자연휴양림 개발 중
	농업용	26	밭기반 정비사업 농업용수 개발(용수공급 시설중)
	관측용	13	광역상수도 감시정 9공 인공함양 조사관측관정 4공
사설	소 계	26
	생활용	12	준공신고 절차 이행중 6공 골프장등 현재 개발중 6공
	농업용	11	준공신고 절차 이행중 3공 염지하수 개발중 8공
	관측용	3	고미네랄 천연광천수 조사관측관정

29. 상수도 모니터 요원 운영실적(2007, 2008년도)

구분	모니터요원현황			운영주기	운영실적	주요운영 내 용
	계	남	여
제주시	49	40	9	분기1회	○ 2007년도 ∙회의개최: 3회, 122명 ∙상수도시설 선진지 시찰 : 1회, 24명 ∙생활민원 신고 : 63명, 92건 ∙명예감독관 : 12건	․상수도민원 주민불편 해소 건의 ․상수도고장,누수신고 ․상수도 시설공사 명예감독관 활동 ․상수도관련 시책 주민홍보등
					○ 2008년도 ∙회의개최: 2회, 82명 ∙상수도시설 선진지 시찰 : 1회, 11명 ∙생활민원 신고 : 58명, 85건 ∙명예감독관 : 9명
서귀포시	33	27	6	분기1회	○ 2007년도 ∙간담회 개최 : 2회 ∙선진지 상수도시설 견학 : 1회 - 기간 : '07. 8. 27 ~ 8. 29 - 참석 : 21명 ∙지역주민 불편사항의견접수 - 8건(처리완료)	․상수관련 주민불편사항에 대한 건의 해소 ․수도관 누수, 부정 수도사용 등 발견사항 신고 ․상수도 관련 미담, 수범사례 수집 제보 ․상수도 관련 주민설문 조사 등 참여 및 지원 ․상수도관련 시책 주민 홍보 등 행정의 후원 역할
					○ 2008년도 ∙간담회 개최 : 2회 ∙선진지 상수도시설 견학 : 1회 - 기간 : '08. 10. 21 ~ 10. 23 - 참석 : 8명 ※제주시상수도모니터요원과 합동 실시 ∙지역주민 불편사항의견접수 - 처리완료 : 8건

ꏚ 상수도 모니터 요원 명단

【제 주 시】 - 49명

읍면별	성 명	주 소	비고
한 림	임철호	한림읍 대림리 1893-1
	양여환	한림 금능리 1265-1
애 월	부창범	애월읍 어음2리 3127
	이창성	애월읍 광령2리 3161-1
구 좌	고형규	구좌읍 세화리 1543-1 다연빌라 나/102
	김태현	구좌읍 김녕리1363
조 천	김근찬	조천읍 와흘리 1559-2
한 경	고인숙	고산리 2276
	김언조	두모리 2864-1
추 자	박광조	대서리 146
	한경화	신양리 422
우 도	김봉삼	우도면 조일리 71
	김경철	우도면 오봉리 1029-1
일도1	박용부	일도1동 1138-1 동양빌리지 101
	변동호	일도1동 1477-2
일도2	정공칠	일도2동 113-4 성환A 103/110
	우덕일	일도2동 113-4 대림1차A 103/407
이도1	김종주	이도1동 1563-2
	김덕영	이도1동 1664-4광양미화나/210
이도2	강시양	이도2동 405 연산홍주택 103/308
	강명희	도남동 800 도남e-편한세상 107/504
삼도1	김근석	삼도1동 555-14
삼도2	강봉하	삼도2동 259-37
	좌미자	삼도2동 254-1
용담1	김정현	용담1동 308-13
	이규탁	용담1동 261-2

읍면별	성 명	주 소	비고
용담2	김종빈	용담2동 645-5
	부윤자	용담2동 361
건 입	정현실	건입동 984-130
	고원평	건입동 674-9
화 북	고재성	화북1동 1818
	김경빈	화북1동 10-1 화북1A 109/708
삼 양	고영준	삼양2동 2142-11 이어도A 702
	홍금순	삼양1동 1580-13
봉 개	고영남	봉개동 2497-1
	김동규	회천동 1275-2
아 라	장재실	오둥동 403
오 라	송지택	오라1동 1279
	백성철	오라2동 1531-1
연 동	고영자	연동 321-11
	양원철	연동 1481-7 2층
노 형	김홍근	노형동 1045-10
	오재석	노형동 750
외 도	양태경	외도1동 435-15
	김성훈	도평동 851
이 호	송두길	이호1동 510-3
	강순아	이호1동 1772
도 두	한태섭	도두1동 2514
	고근식	도두2동 249-1

【서귀포시】 - 33명

읍ㆍ면ㆍ동	성 명	주 소	비 고
대정읍	송 용 진	대정읍 보성리 1257
	김 홍 기	대정읍 하모리 824-4
	김 청 부	대정읍 동일리 2861
남원읍	이 재 민	남원읍 신례리 1005-6
	고 성 호	남원읍 위미리 1116-13
	이 양 건	남원읍 태흥리 477-1
성산읍	김 한 영	성산읍 오조리 822
	김 석 범	성산읍 수산리 1256-1
	양 두 호	성산읍 신산리 1038-2
안덕면	허 명 자	안덕면 화순리 1298
	박 인 애	안덕면 창천리 204
	문 수 선	안덕면 덕수리 872-1
표선면	고 권 창	표선면 표선리 504-3
	김 성 헌	표선면 토산리 402
	김 박 남	표선면 성읍리 887
송산동	김 순 현	서귀포시 보목동 761
정방동	허 상 욱	서귀포시 서귀동 135-2
중앙동	안 태 수	서귀포시 서귀동 279-9
천지동	변 수 문	서귀포시 서귀동 297-28
효돈동	김 미 형	서귀포시 하효동 186 전원주택 302호
영천동	조 형 철	서귀포시 토평동 1672-1
동홍동	오 성 삼	서귀포시 동홍동 1078-1
	김 중 현	서귀포시 동홍동 476-1 삼원다세대 주택 가/102
	양 재 석	서귀포시 동홍동 1079
서홍동	현 홍 숙	서귀포시 서홍동 1905-3
	문 기 용	서귀포시 서홍동 169
대륜동	강 민 국	서귀포시 법환동 578
	오 종 석	서귀포시 호근동 1942
대천동	서 승 균	서귀포시 도순동 243-1 진양빌라 B동 506호
	조 상 건	서귀포시 도순동 243-1 진양빌라 A동 502호
중문동	임 희 준	서귀포시 중문동 2154
	김 성 훈	서귀포시 대포동 1742
예래동	강 명 수	서귀포시 상예동 1419

30. 수돗물 평가위원회 운영현황

ꏚ 설치근거 : 수도법 제30조 및 제주특별자치도수도급수조례 제48조

ꏚ 구    성 : 10인 이내(당연직 1, 위촉직 9)

※ 당연직 : 상하수도본부 상수도관리부장

ꏚ 기    능

∙ 수돗물의 정기적인 수질검사 실시 및 공표

∙ 수도사업자에 대한 수질관리 및 수도시설의 운영에 대한 자문

∙ 수돗물 수질과 관련하여 도지사가 요청하는 사항

ꏚ 임    기 : 2008. 8. 16 ~ 2010. 8. 15(2년)

ꏚ 위원회 명단

구 분	위 원 명	비 고
위원장	김원형	(현)제주대 화학과 교수 (전)제주시 수돗물 평가위원
부위원장	김태성	(현)제주YMCA사무총장 (전)제주시 수돗물 평가위원
위 원	강익상	(현)제주시 조천읍 주민자치위원회 위원 (전)북제주군 수돗물 평가위원장
	강진옥	(현)서귀포시 자원봉사센터운영위원 (전)서귀포시 수돗물 평가위원
	문창기	(전)광역수자원관리본부 기술담당관 (현)건설기술심의위원회위원
	문춘옥	(현)제주시의 제21협의회운영위원 (전)제주시 농협부녀회 회장
	박은옥	(현)제주대 간호학과 교수 서울대 보건학 석사․박사
	황홍자	(현)한국음식업중앙회제주시지부장
	강명희	(현)여성특별위원회 위원
	양윤호	(현)상하수도본부 상수도관리부장

ꏚ 운영실적

구 분	계	회의개최	수질검사 실시	수질검사 결과공표	비 고
건 수	24	12	8	4
2006년	6	4	1	1
2007년	10	5	3	2
2008년(10. 31기준)	8	3	4	1

ꏚ 운영예산

구 분	계	운영수당	수질검사수수료	수질검사 결과 공고료	비 고
건 수	102,403	17,300	37,103	48,000
2006년	6,721	2,900	3,821	-
2007년	46,482	7,200	15,282	24,000
2008년	49,200	7,200	18,000	24,000

31. 부정수도 및 탈루세입 단속실적 및 조치현황(최근 3년간)

(단위 : 건, 천원)

연도별	유형별	적발 건수	부정사용료과징금	조 치 사 항				비 고
				철거	급수정지	과태료 부 과	과징금 부과
2006	-	-	-
2007	부정수도	5	7,508				5
2008	-	-	-

32. 제주물과학공원 조성사업 추진상황

◈ 제주도의 물 이용 역사에서부터 물 보전 교육과 테마파크 기능을 겸비한 종합적인 시설을 갖춘 제주물환경학습공원을 조성

◈ 수자원 보전교육 및 홍보기능과 더불어 제주도의 관광자원으로 활용

ꏅ 사업개요

□ 사업위치 : 서귀포시 강정동 3016번지 일원

□ 사업기간 : 2006년 ~ 2012년

□ 총사업비 : 29,800백만원(국비 14,900 지방비 14,900)

□ 사 업 량

• 물학습·과학·홍보관 3동(4,800㎡)

• 야외학습시설 1식, 조경 및 기타 기반시설 1식

ꏅ ‘07까지 추진실적

□ 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료 : 2006. 9. 16(57백만원)

□ 2007년 예산편성(안)에 지방비 526백만원을 계상하였으나, 제주특별자치도의회의 예산안 심사과정에서 전액 삭감됨

ꏅ 향후계획

□ 지하수관리특별회계 예산규모에 비해 사업비(지방비)가 과다하므로 향후 지하수관리특별회계 예산운용이 원활해지는 시점까지 사업 유보

33. 지하수 오염방지사업 추진실적(최근 3년간)

ꏅ 지하수 페공 원상복구 사업

(단위 : 백만원)

년도별	공사명	공사금액	사업량	시행업체	비 고
2006	지하수폐공 원상복구공사	48	15공	한국농촌공사 제주도본부
2007		73	22공	삼덕개발(주)
2008		150	24공	남천개발
			15공	(주)남원건설
			11공	-

ꏅ 지하수 관정 사후관리 시행

□ 근 거 : 제주특별자치도특별법 제320조 및 지하수관리기본조례 제35조(2006.7.1)

□ 사후관리대상 및 주기

•전문기관에 의한 사후관리 : 1,405공(상수도용․음용․공공농업용)

- 매 3년마다 1회(상수도․음용․생활용 등), 매 5년마다 1회(농․임․축산업용)

•도지사에 의한 사후관리 : 3,424공(양수능력 500톤/일 미만) - 2년마다 1회

□ 추진실적

•전문기관에 의한 사후관리

- 지하수개발․이용자(관정소유자) 전문기관과 사후관리 위탁계약 체결 완료

•도지사에 의한 사후관리 : 3,424공 추진

- 전문기관에 민간위탁 용역 사후관리 : 2,135공

- 농업용 기간연장허가와 병행 사후관리(자체추진) : 1,289공

□ 향후 추진계획

•지하수관정 이용실태 조사(2009년도)

- 사업량 : 3,500공, 사업비 : 420백만원

⇒ 전문기관 사후관리 대상관정 제외(500톤/일 미만)

34. 지하수 폐공 및 점검실적

○ 도민의 생명수인 지하수를 지속 이용 가능한 청정 수자원으로 관리 해나가기 위하여 이용하지 않고 방치되어 있는 지하수공을 빠짐없이 원상복구 추진

ꏅ 추진방향

□ 폐공 자진신고기간을 연중 운영하여 폐공대상 관정 지속 발굴 원상복구 추진

□ 소유자가 불분명한 폐공대상 관정 신고자에게 보상금 지급(건당 100천원)

ꏅ 추진실적

연도별	계	도		시 및 자체 (공수)	비 고
		공 수	사업비(백만원)
계	629	214(20)	691	415
‘91~’02년	221	-	-	221
2003년	66	55	249	11
2004년	10	7	32	3
2005년	114	55	139	59
2006년	33	15	48	18
2007년	49	22	73	27
2008년	136	60(20)	150	76	20공 종료신고완료 (‘09년 사업추진)

※ 폐공 유형별 현황

∙ 용도상실 : 192공(작목전환, 공장폐쇄, 시설이전)

∙ 수질불량 :  95공(토사발생, 염분과다)

∙ 개발사업 :  75공(구획정리, 도로확장)

∙ 무허가공 :  57공(무허가굴착공)

∙ 기    타 : 210공(수량부족, 비중저하 등)

ꏅ 2009년 추진계획

□ 폐공 원상복구 : 30공 - 150백만원

□ 지하수 폐공 신고센터 상시 운영

ꏅ 기대효과

□ 장기간 미사용 관정 등을 원상복구 조치함으로써 수질오염 예방

□ 불필요한 관정을 정비함으로써 지하수 개발량 감량효과 도모

35. 지하수 개발․이용자 수질검사 결과 현황(최근 3년간)

구 분	검사건수	합 계		생활용수		공업용수		농업용
		적 합	부적합	적 합	부적합	적 합	부적합	적 합	부적합
합계	6,187	5,973	214	1,800	52	160	7	4,013	155
2006	1,240	1,205	35	462	-	3	-	740	35
2007	3,470	3,352	118	108	5	12	-	3,232	113
2008	1,477	1,416	61	1,230	47	145	7	41	7

36. 수질기준 초과 지하수에 대한 조치결과(최근 3년간)

구분	초과사항				조 치 결 과	비고
	계	생활용	공업용	농업용
2006	35	-	-	35	▪ 재검사결과 적합처리 35건
2007	118	5	-	113	▪ 재검사결과 적합처리 115건 ▪ 폐공처리 3건
2008	61	47	7	7	▪ 재검사결과 적합처리 52건 ▪ 재검사 중 9건

37. 지표수 및 용천수 개발사업 추진현황

ꏚ 전체계획 - 43개지구(개소) 1,335.3만톤

- 사업비 : 3,595억원(국비 2,850억원, 지방비 240억원, 민자 505억원)

□ 2016년까지 저수지 등 대체수자원 개발(17개지구 959.8만톤)

□ 골프장 등 빗물이용시설 확충(26개소 375.5만톤)

⇒ 농업용 지하수 의존율을 98%(2006년)에서 86%(2016년)로 감축

ꏚ 완료 사업 - 26개지구(개소) 408.2만톤

- 사업비 : 415억원(국비 48억원, 민자 367억원)

□ 지표수 : 용수․귀엄 등 5개지구 125.2만톤(국비 48억원)

□ 빗  물 : 골프장 21개소, 저류지 283만톤(민자 367억원)

ꏚ 추진중 사업 - 4개지구(개소) 217.1만톤

- 사업비 : 947억원(국비 905억원, 민자 42억원)

□ 성읍저수지 : 125만톤(2003∼2013/국비 482억원)

- '08년까지 공정율 37%, 총 18,101백만원투입

□ 옹포저수지 : 63.6만톤(2006∼2016/국비 423억원)

- '08년까지 공정율 19%, 총 7,918백만원 투입

□ 빗 물 : 골프장 2개소(우리들메디칼, 더클래식), 저류지 28.5만톤(민자 42억원)

ꏚ 향후 추진계획 - 13개지구(개소) 710만톤

- 사업비 : 2,233억원(국비 1,897억원, 지방비 240억원, 민자 96억원)

□ 함덕․송당지구 : 350만톤(2008∼2016/국비 460억원)

□ 서림․신도지구 : 50만톤(2009∼2016/국비 360억원)

□ 어승생 제2저수지 : 50만톤(2009∼2011/국비 240억원, 지방비 240억원)

□ 대체수자원 개발(7) : 196만톤(2009∼2016/국비 837억원)

□ 빗 물 : 골프장 3개소(제주,중문,오라), 저류지 64만톤(2009/민자 96억원)

38. 상수도 생산공급에 따른 동력비 현황(최근 3년간)

(단위 : 천원)

구 분	2006년도	2007년도	2008년도 (9월말 기준)	비 고
합 계	6,107,444	6,465,373	5,591,379
수 원 지	1,848,804	2,166,658	1,995,046
정 수 장	1,003,233	1,517,584	1,469,233
가 압 장	1,087,068	695,571	575,620
지하수외	2,168,339	2,085,560	1,551,480

※ ‘08. 9. 30일 기준 : 281개소(수원지 29개소, 정수장 20개소, 가압장 17개소, 지하수외 215개소)

39. 수돗물 도민만족도 설문조사 용역 결과

ꏚ 조사개요

□ 조사대상 : 도내 거주중인 성인 1,500명, 답변 1,124부(회수율 75%)

□ 조사기간 : ‘08. 3. 14 ～ 4. 23

□ 조사방법 : 읍․면․동별 인구비례 서면조사

□ 계약금액 : 8,955천원

□ 통계조사 신뢰도 : 95%신뢰수준에서 최대오차 ±2.92%

□ 조사기관 : (주)한국수도경영연구소  대표 김길복

ꏚ 수돗물 사용실태 비교

사용하는 식수	2007년 (%)	2008년 (%)	증감 (%)
수돗물을 그대로 마심 수돗물을 끓여서 마심 정수기를 이용 먹는샘물(생수)를 마심 기타	31.4 36.5 17.0 14.3 0.8	29.4 42.1 9.7 18.5 0.3	△2.0 5.6 △7.3 4.2 △0.5

ꏚ 현재 식수로서 수돗물의 적합성 비교

적 합 성	2007년 (%)	2008년 (%)	증감 (%)
매우 적합하다 어느정도 적합 별로 적합하지 않다 전혀 적합하지 않다	24.0 58.6 15.7 1.7	19.8 64.1 13.4 2.7	△4.2 5.5 △2.3 1.0

ꏚ 현재 식수로서 수돗물이 적합하지 않는 이유

적합하지 않는 이유	2007년 (%)	2008년 (%)	증감 (%)
녹물이 나와서 이물질이 보여서 냄새가 나서 물맛이 나빠서 기타	9.7 16.6 35.5 21.8 16.4	9.0 17.2 33.1 28.5 12.2	△0.7 0.6 △2.4 6.7 △4.2

ꏚ 수돗물에 대한 신뢰도를 높이는 방법

방 법	2007년 (%)	2008년 (%)	증감 (%)
정수 및 처리과정 공개 상수원의 이전 수질검사 확대와 수질검사기준 강화 처리시설의 선진화 수돗물의 안전성 공인 기타	26.4 20.2 24.0 19.2 9.3 0.9	29.5 - 31.1 30.9 6.9 1.6	3.1 - 7.1 11.7 △2.4 0.7

ꏚ 타 시․도와 수돗물 수질에 대한 비교

타 시․도에 비해	2007년 (%)	2008년 (%)	증감 (%)
매우좋음 좋 음 비 슷 나 쁨 모르겠다	24.0 58.6 15.7 1.7 -	35.1 50.0 9.7 1.2 4.0	11.1 △8.6 △6.0 △0.5 4.0

ꏚ 수돗물 오염의 원인

오염의 원인	2007년 (%)	2008년 (%)	증감 (%)
상수원의 오염심화 처리시설의 노후화 수도관 탱크의 오염 잘 모르겠다 기타	26.7 21.5 24.4 18.2 9.2	32.3 21.6 40.2 3.9 2.0	5.6 0.1 15.8 △14.3 △7.2

40. 상수도 모니터요원 건의사항 조치결과(2008년도)

❏ 제 주 시 (8건)

일시	건의자	건의사항	조치결과	비고
2008 4. 23	용담2동 김종빈	○용문로~용문로타리간 급수 취약지 개선(탑마트주변)	○제수변조절등으로 수압이 상승하여 급수취약지역 해소
		○용문 서오로 북측 상수도관 제수변 뚜껑 도로 포장시 매몰시킴 확인바람	○매몰된 제수변 원상복구 시공완료
2008 4. 23	일도2동 우덕일	○동광초등학교 주변도로 하수도 준설요망	○준설완료
2008 4. 23	삼도2동 좌미자	○북초등학교 주변 도로변 맨홀 나뭇잎등이 쌓여있어 준설 요망	○준설완료
2008 4. 23	화북동 김경빈	○상수도 공사시 감독 및 마무리 철저 요망(터파기,되 메우기,덧씌우기 등)	○현재 시행중인 각 공사장 시공현장별로 교육 및 완벽한 시공 지도감독
2008 4. 23	한림읍 양여환	○한림지역 상수도 공사시 단수 지역 축소방안 강구요망	○상수도 공사의 부분에 따라 단수지역이 다르나 제수 밸브의 설치를 증대시켜 소규모 지역 단위 단수를 통한 공사(보수)가 될 수 있도록 시행하고 있음
2008 4. 23	오라동 백성철	○애향운동장 공설마을 주변 수압 강화방안 강구요망	○연북로~보건소간 배수관 시설공사 및 광역2단계 시설공사(‘08년 12월 준공)를 추진중임
2008 4. 23	이도2동 강명희	○도남 대림1차아파트 주변 고물상 이전 예정지 상수도 공급 조기시행 요망	○연북로~보건소간 배수관 시설공사(‘08년 7월준공) 됨으로써 해소

❏ 서귀포시 (8건)

일시	건의자	건의사항	조치결과	비고
2008 1.25	동홍동 김중현	○다세대 주택 직수 사용 법적 하자 여부	○현재 2층까지는 직수연결 가능 ○2층이상 수압부족시는 저수조 및 옥상탱크 시설을 해야 가능
2008 1.25	안덕면 박인애	○‘07년도 상수도 공사현장 마무리 조속히 시행 ○공사로 인하여 수돗물에서 모래 유출 및 계량기 모래유입으로 수압이 약함	○빠른 시일내 현장조치로 ‘07년도 상수도 사업 마무리 ○상수도 공사시 관내로 모래유입 되지 않도록 현장관리 철저
2008 1.25	천지동 변수문	○자가검침시 요금감면 혜택 여부	○업종별 사용량 1톤 감면 ○옥내누수 감면을 1회 감면실시
2008 1.25	남원읍 고성호	○다지기 공사 마무리 철저 (상수도 노후관 교체공사 및 개인급수전 공사후 노면이 빠짐)	○공사시 도로굴착후 침하율 제고를 위해 새로운 흙, 토사, 골재로 복구
2008 1.25	표선면 김박남	○성읍리 남문상가 노후관 교체공사 협조	○성읍리 노후관 교체공사 발주 -사업량 : L=601m, D=16~75mm -사업비 : 36,390천원 -완료예정일 :'08. 12. 20
2008 1.25	남원읍 이양건	○태풍「나리」피해로 수돗물 공급이 중단되어 농업용수 사용. 식수공급이 바로 이루어졌으면 좋겠음	○당시 태풍피해로 상수도시설물 (정수장 등) 및 한전 정전 → 펌프가동이 불가능하여 급수공급이 불가피하게 중단
2008 1.25	대륜동 오종석	○노후관 교체공사시 모니터 요원 명예감독관 위촉여부	○현재 시행중 -상수도사업(노후관 교체공사 등) 추진시 현재 지역 모니터요원을 명예감독관으로 위촉하고 있음
2008 1.25	안덕면 문수선	○80세 후반 노부부가 사는 집에 수돗물 사용을 계량기 옆의 밸브로 조정하여 물을 사용함. 현장확인하여 불편사항 해결 요망	○현장 확인후 즉시 조치완료

41. 우도 해저상수도 시설사업 추진상황

□ 우도지역은 생활수준 향상과 관광인구 증가로 수돗물에 대한

양적․질적인 욕구는 증대되고 있으나,

□ 해수담수화시설 용량 부족 및 염지하수 부존량 한계로 안정적인

공급이 어려워지고 있는 상황

ꏅ 급수현황

□ 급수시설 : 담수화시설 1,300톤/일 (‘07년 300톤 자체 증설)

☞ 사업비 : 3,899백만원(국비 2,295, 지방비 1,604)

□ 급수인구 : 1,726명(연간 관광객(‘07) 52만명)

☞ ‘08년 일최대 관광객(8/16) : 5,205명, 차량 605대

□ 사업기간 : 1997. 9 ~ 2001. 7 (주민급수 ‘99.1)

□ 급 수 량 : 293천톤/년, 일최대 1,150톤(1인1일급수량 229ℓ)

□ 운영관리비 : 233백만원/년, 생산원가 1,129원/톤

ꏅ 실태 및 전망

□ ‘07년 담수화시설 증설로 물 부족은 없으나 시설 노후, 유지관리비 과다 및 고장시 대체 공급시설 전무(‘07년 증설 : 1,000톤/일→1,300톤/일)

□ 급격한 관광객 증가로 2010년에는 상시 식수 부족 예상

☞ ‘01년 31만 명 → ’07년 52만 명 → ’11년 70만 명 예상(‘10년 1일 500톤, ’15년 1,000톤 부족 예상)

ꏅ 추진상황

□ 기본 및 실시설계 용역 추진 : ‘08. 4. 24 ~ 11. 20

□ 육상 및 해저관로 공사 발주 : ‘08. 12

(단위 : 백만원)

사 업 내 용	재 원	계	2008년	2009년	2010년
◦ 기본 및 실시설계 ◦ 해저상수도관로시설 ․관로 13.3km(육상 10.2, 해상 3.1) ․배수지 : 2,050톤(1,000톤×2지)	합 계	10,000	2,000	5,000	3,000
	국 비	7,000	1,400	3,500	2,100
	지방비	3,000	600	1,500	900

※ 관로구간 : 구좌읍 상도리 → 종달리 → 우도면 서광리 → 우도담수장 배수지

ꏅ 향후계획

□ 2009년도 : 종달~우도간 해저관로 3.1km(50억원)

□ 2010년도 : 육상관로 10.2km 및 배수지 1,000톤 2지(30억)

42. 상수원 보호구역 토지매입 관련(최근 3년간)

ꏅ 보호구역 현황

□ 보호구역 수 : 13개소(제주 8, 서귀 5)

□ 보호구역면적 : 1,822천㎡(제주 1,551, 서귀 271)

• 공유지 1,000천㎡(55%), 사유지 : 822천㎡(45%)

❍ 지금까지 부지매입 실적 : 34필지, 48천㎡

• 외도 23필지, 46천㎡, 금산 : 11필지 2천㎡

ꏅ 주민지원사업 내역

(단위 : 천원)

연도별	보 호 구역명 (수원명)	면 적 (㎡)	매입금액 (㎡당 단가)	사 업 비			매입 후 활용실태	비고
				계	국비	지방비
2006	계	8,572㎡		230,000	69,000	161,000
	외도 수원지	전/8,572㎡	27	230,000	69,000	161,000	행위제한지역으로 자연상태 유지
2007	계	2,087㎡		470,408	141,122	329,286
	외도 수원지	전/1,577㎡	38	60,530	18,159	42,371	행위제한지역으로 자연상태 유지
	금산 수원지	(토지․건물) 대/510㎡	803 (건물포함)	409,878	122,963	286,915	거주민 이주로 철거 예정
2008	계	1,319㎡		160,238	48,121	112,117
	외도 수원지	전/1,250㎡	50	63,253	19,026	44,227	행위제한지역으로 자연상태 유지
	금산 수원지	(토지․건물) 대/69㎡	1,405 (건물 포함)	96,985	29,095	67,890	거주민 이주 후 철거 예정

43. 상수도 유휴시설 정비사업 추진상황

□  상수도업무가 통합되어 광역상수도 확대 공급됨에 따라 수질저하

및 가동율이 낮은 기존시설 정비를 통하여

∙ 맑고 깨끗한 용수 공급으로 도민의 삶의 질을 향상시키고,

∙ 상수도 생산단가를 낮춤으로써 공기업경영의 경쟁력을 강화하며,

∙ 시설의 효율적 운영으로 관리능력 제고 및 수자원 보호

ꏚ 추진계획

□ 수량 및 수질이 불량하거나 광역상수도로 대체 공급된 지하수에 대하여

타용도 전환 또는 년차적으로 시설 폐지 추진 -------------- 총75개소

ꏚ 추진상황

□ 2007년 까지  -----------------------------------------------------------  37개소

• 농업용으로 관리 전환( 제주시 14, 서귀포시 8 ) ---------------- 22개소

• 수위 관측공으로 관리전환(환경자원연구원) --------------  3개소

• 지하수 원상 복구(폐공) (제주시 2) ------------------------- 2개소

• 원상복구(폐공) 추진 예정 ------------------------------------ 10개소

□ 2008년 추진 -------------------------------------------------------------  28개소

• 농업용으로 관리 전환 추진( 제주시 18, 서귀포시 8 ) -------- 26개소

• 원상복구(폐공) 추진 예정 -----------------------------------  1개소

• 용천수(서림수원) 농업용수 활용 추진 ------------------------  1개소

□ 2009년 계획(지하수) ------------------------------------------------  10개소

ꏚ 기대효과

□ 광역상수도 용수공급체계 전환에 따른 소규모 유휴시설 정비로 상수도 경영합리화 제고

☞ 유휴시설 정비에 따른 원가 절감 -----------------------------------  4,529백만원

• ‘07까지 : 지하수 37개소 광역상수도 대체 (1,220백만원)

• ‘08추진 : 용천수 1개소(서림), 지하수 27개소 정비 (3,309백만원)

□ 유휴시설에 대한 관리전환 및 원상복구를 통하여 지하수의 효율적 이용 제고와 지하수 오염 방지

• 기존 지하수의 재활용(용도전환)시 개발사업비 절감 및 지하수자원의  효율적 이용 제고(지하수 개발비용 22억원 절감)

44. 저수지 개발사업 추진상황

【성읍지구】

ꏚ 사업개요

□ 사업구역 : 서귀포시 표선면 성읍리외 2개리

□ 개발면적 : 400㏊

□ 주요내용

- 저수지 : 1개소             - 유입시설 : L=255m, B=5m, H=3m

- 취입보 : L=50m, H=2.2m    - 방수재 : L=2,248m, H=6.0m

- 용수로 : 27조 34.188㎞      - 도 로 : 2조 3.43㎞

□ 사업기간 : 2003. 12. 29 ～ 2013. 12. 28(11개년)

□ 사업시행자 : 한국농촌공사 제주지역본부

□ 사 업 비 : 48,192백만원

ꏚ 사업추진현황

(단위 : 백만원)

구 분	총계획	2007까지	2008예산	2009이후
< 사 업 비 >
계［진도］	48,192	15,151[31%]	2,950[6%]	30,091[63%]
○ 공 사 비	38,792	9,663	2,394	26,735
○ 보 상 비	5,380	3,523	388	1,469
○ 시설부대경비	4,020	1,965	168	1,887
< 주요공사 >
○ 저 수 지	1개소	1개소(계속)	1개소(계속)	1개소(완료)
○ 도 로	2조 3.43km	1조 2.38km(완료)	-	1조 1.05km
○ 평 야 부	용수로 34.2km	-	용수로 3.3km	용수로 30.9km

【옹포지구】

ꏚ 사업개요

□ 사업구역 : 제주시 한림읍 동명리외 10개리

□ 개발면적 : 400㏊ (수혜면적 600㏊)

□ 주요내용

- 저류지(집수지) : 1개소(월계지 저수용량 1천㎥)

- 조절지 : 2개소(동명지 A = 2.8㏊, 유효저수량 136천㎥)

(상대지 A = 7.4㏊, 유효저수량 500천㎥)

- 양수장 : 2개소(1단 : 220kw×200㎜) (2단 : 170kw×200㎜)

- 가동보 : 2개소(B=5.0m, B=10m)

- 용수관로 : 19조, 35.6㎞

- 도로 : 1.3㎞(폭 7.0m 아스콘포장)

□ 사업기간 : 2005 11 ～ 2016. 12(11개년)

□ 사업시행자 : 한국농촌공사 제주지역본부

□ 사 업 비 : 42,317백만원

ꏚ 사업추진현황

(단위 : 백만원)

구 분	총계획	2007까지	2008예산	2008이후
< 사 업 비 >
계［진도］	42,317	5,168[12%]	2,750[6%]	34,399[81%]
○ 순공사비	35,169	1,400	1,613	32,156
○ 보 상 비	3,581	2,371	1,000	210
○ 관리비, 기타	3,567	1,397	137	2,033
< 주요공사 >
○ 저 류 지(집수지)	1개소	1개소(계속)	1개소(계속)	1개소(완료)
○ 조 절 지	2개소	2개소(계속)	2개소(계속)	2개소(완료)
○ 도 로	1조 1.3km	-	-	1조 1.3km
○ 평 야 부	19조35.6km	-	-	19조35.6km

【함덕지구】

ꏚ 사업개요

□ 위치(구역) : 제주시 조천읍 함덕리, 구좌읍 송당리 등 10개리

□ 사업규모 : 수혜면적 800ha, 용수로 14조(27㎞)

□ 사 업 비 : 47,950백만원

ꏚ 추진현황

□ 2007. 1. 18 : 기본조사 대상지 제출(도 → 농림부)

□ 2007. 5. 01 : 기본조사지구 선정(농림부 → 도)

□ 2007. 6～12 : 기본조사 실시

□ 2008. 2. 20 : 세부 실시설계 시행지구 선정

ꏚ 향후 추진계획

□ 2008. 3～12 : 실시설계 추진(한국농촌공사 제주지역본부)

□ 2008. 12 : 시행계획 확정

□ 2009. 03 : ‘09년 중규모 농촌용수개발사업 착수지구 선정

⇒ 개발사업 시행인가 및 고시 등 행정절차 이행(‘09.3～9)

□ 2009. 09 : 사업착공

【서림지구】

ꏚ 사업개요

□ 위치(구역) : 서귀포시 대정읍 신도리 등 5개리

□ 사업규모 : 수혜면적 1,525ha, 용수로 20조(35㎞)

□ 사 업 비 : 30,000백만원

ꏚ 추진현황

□ 2004. 12. 8 : 기본조사 대상지 제출(도 → 농림부)

□ 2006. 3.  2 : 기본조사 대상지 제출(도 → 농림부)

□ 2007. 1. 18 : 기본조사 대상지 제출(도 → 농림부)

□ 2008. 6. 02 : 농림수산식품부 방문 기본조사 대상지 선정 절충

⇒ 신규사업 억제 방침으로 농촌용수 이용체제 재편사업 추진방안 적극 검토

ꏚ 향후 추진계획

□ ‘09년 타당성조사 및 기본조사지구 선정 적극추진

45. 하수관거 BTL사업 추진상황

공 사 명		공 사 개 요	공사금액 (억원)	공 사 기 간	도 급 자	추 진 상 황
‘06사업			1,817
	제주시동지역 (일도1, 이도1, 삼도1, 삼도2, 건입동)	• 우오수관 : 80km • 배수설비 : 3,906개소	484	‘06~’11	• 도외업체(70%) - 대우건설외 2개사 • 도내업체 - 유성건설외 3개업체	• ‘08. 3. 3착공 • ‘08계획 10.7km 중 5.4km 완료
	제주시 읍면지역 (한림, 애월, 구좌)	• 우오수관 : 100km • 배수설비 : 4,407개소	538	‘06~’11	• 도외업체(70%) - 한화건설외 2개사 • 도내업체(30%) - 유성건설외 3개업체	• ‘08. 3. 3착공 • ‘08계획 16km 중 12km 완료
	서귀포시 읍면지역 (남원, 표선)	• 우오수관 : 112km • 배수설비 : 4,995개소	795	‘06~’11	•도외업체(70%) - 포스코외 1개사 • 도내업체(30%) - 덕영건설외 3개업체	• ‘08. 2. 29 착공 • ‘08계획 19km 중 12km 완료
‘08사업			1,562
	제주시 동지역 (일도1, 일도2, 이도2, 건입동)	• 우오수관 : 95km • 배수설비 : 5,679개소	650	‘08~’13		• ‘07. 9. 12 : 사업비 확정 • ‘07. 12. 21 : 의무부담 도의회 의결 • ‘08. 8. 4 : 기본계획용역 착수 • ‘08. 10. 31 : 사전환경성검토 협의완료(영산강청) • ‘08. 10. 27 : 기본계획협의 및 민자적격성 등 검토 의뢰 (환경부, KDI) • ‘08. 11 : 민간 투자 심의위원회 심의 • ‘08. 12 : 기본 계획 고시

공 사 명		공 사 개 요	공사금액 (억원)	공 사 기 간	도 급 자	추 진 상 황
	제주시 읍면지역 (한림, 애월, 구좌) ‘	• 우오수관 : 166km • 배수설비 : 4,616개소	912	‘08~’13		• ‘07. 9. 12 : 사업비 확정 • ‘07. 12. 21 : 의무부담 도의회 의결 • ‘08. 8. 4 : 기본계획용역 착수 • ‘08. 10. 31 : 사전환경성검토 협의완료(영산강청) • ‘08. 10. 27 : 기본계획협의 및 민자적격성 등 검토 의뢰(환경부, KDI) • ‘08. 11 : 민간투자심의 위원회 심의 • ‘08. 12 : 기본계획 고시
‘09사업			481
	제주시읍면지역 (애월, 조천, 한경)	• 우오수관 : 60.7km	481	‘09~’12		• ‘08. 10. 22 : 대상지역 및 한도액 결정(환경부) • ‘08. 11월 ~ 12월중 : 도의회 의무부담 상정․ 의결

< 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 참여업체 현황 >

‘06년 제주시 동지역 BTL 사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비고
푸른제주 지키미 주식회사	대우건설(주)	박세흠	서울시 중구 남대문로 5가	30	주간사
	삼부토건	정진우	서울시 중구 남창동	15
	(주)한진중공업	김정웅	부산시 영도구 봉래동	15
	(주)서희건설	곽선기	경기도 성남시 분당구	10
	흥남종합건설(주)	김원하	제주도 제주시 일도2동	10
	유 성 건 설 (주)	김영철	제주도 제주시 오라1동	10
	한일종합건설(주)	문조숙	제주도 제주시 이도2동	5
	대 창 건 설 (주)	김대현	제주도 제주시 용담2동	5

‘06 제주시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비 고
제주 엔바이로 주식회사	한화건설(주)	김현중	경기도 시흥시 대야동	40	주간사
	남광토건	이동철	서울시 강남구 청담동	30
	유 성 건 설 (주)	김영철	제주도 제주시 오라1동	15
	광명종합건설(주)	양재순	제주도 제주시 연동	5
	태웅종합건설(주)	한경옥	제주도 제주시 일도2동	5
	한일종합건설(주)	문조숙	제주도 제주시 이도2동	5

‘06 서귀포시 읍․면지역 BTL사업

컨소시엄명	상 호	대표자	소 재 지	지분율 (%)	비고
청정서귀포 주식회사	포스코건설	한수양	경북 포항시 괴동동	35	주간사
	삼부토건	정진우	서울시 중구 남창동	35
	(주)덕영종합건설	양경대	제주도 제주시 연동	12
	영보종합건설(주)	진성진	제주도 제주시 연동	10
	한일종합건설(주)	문조숙	제주도 제주시 이도2동	5
	해양종합건설(주)	강인귀	제주도 제주시 건입동	3

46. 하수처리시설 주변 주민숙원사업 추진현황

처리시설	지원사업명	사업개요	지원년도	지원액 (천원)	비고
총 계				1,900,000
제주하수처리장	소계			600,000
	신사수동 마을복지회관 신축	□ 사업규모 : 마을복지회관 842㎡ □ 사업기간 : 2006.1.10 ~ 2007.9.13 □ 전체사업비 : 826,475천원 - 보조금 : 600,000천원	2006	150,000	완료
			2007	450,000
	소계			1,300,000
	도두어촌계 수산물판매시설 신축	□ 사업규모 : 수산물판매시설 1,958㎡ □ 사업기간 : 2007.9.19 ~ 2008.5.31 □ 전체사업비 : 1,455,000천원 - 보조금 : 1,300,000천원	2007	500,000	완료
			2008	800,000

47. 하수슬러지 광역처리시설사업 추진상황

ꏅ 하수슬러지 발생 및 처리현황(‘07년말)

(단위 : ㎥/D)

처리장명	시설용량	하수처리량	슬러지 발생량	슬러지 처리량
				계	매 립	해양투기
계	197,000	121,909	35	35	0.5	34.5
도 두	130,000	90,578	28	28	-	28
월 정	6,000	1,268	0.1	0.1	0.1	-
판 포	6,000	1,523	0.2	0.2	0.2	-
보 목	20,000	13,888	4.2	4.2	-	4.2
색 달	15,000	9,589	1.9	1.9	-	1.9
대 정	8,000	3,682	0.4	0.4	-	0.4
성 산	4,000	1,381	0.2	0.2	0.2	-
남 원	8,000	-	-	-	-	-

※ 남원처리장 ‘08년 2월 가동

ꏅ 사업개요

❍ 사 업 명 : 제주도 하수슬러지 자원화시설 설치사업

❍ 위    치 : 제주시 도두2동 24-4번지(제주하수처리장내)

❍ 처리방법 : 매립장 복토재 활용

❍ 시설규모 : 70톤/일

❍ 부지면적 : 3,376㎡(건축면적 910.66㎡)

❍ 건축규모 : 지하 2층, 지상 3층, 연면적 1,882.44㎡

❍ 사업기간 : 2005. 3 ～ 2010. 6

❍ 총사업비 : 11,700백만원(국비 6,774, 지방비 4,926)

- ‘08년 사업비 : 2,285백만원(국비 1,600, 지방비 685)

ꏅ 추진상황 및 계획

❍ ‘05.  3.    : 환경관리공단 업무 위․수탁 협약 체결

❍ ‘05.  7.    : 타당성조사 및 기본계획 용역

❍ ‘07.  7. 13 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

❍ ‘07.  8. 13 : 설계․시공 입찰공고(턴키)

❍ ‘07. 12. 12 : 기본설계 심의(평가위원 9명)

❍ ‘07. 12. 18 : 사업자 선정(효성에바라엔지니어링, 유성건설)

❍ ‘08.  3. 20 : 실시설계 적격심의

❍ ‘08.  4. 23 : 재원협의

❍ ‘08.  6. 27 : 도시관리계획 변경 결정

❍ ‘08.  8. 28 : 공공하수도 설치인가 및 고시

❍ ‘08. 10. 30 : 공사 착공

ꏅ 향후 추진계획

❍ ‘10.  6. 30 : 공사 준공

ꏅ 기대효과

❍ 하수슬러지의 해양 투기 금지로 해양 오염 방지

❍ 하수슬러지 재활용으로 인한 자원 절약

48. 하수처리장 고도처리시설 추진상황

❍ 방류수질 기준 강화로 법적기준 준수를 위하여 고도처리시설 추진

※ BOD(㎎/l) 20⇒10, COD(㎎/l) 40,  SS(㎎/l) 20⇒10, T-N(㎎/l) 60⇒20, T-P(㎎/l) 8⇒2

❍ 방류수 수질 향상에 따른 환경오염 최소화로 청정 해역 보전

ꏅ 근 거 : 하수도법 제7조(방류수수질기준)에 의거 방류수질 기준강화(‘08.1)

ꏅ 고도처리 시설현황

구분	도두	동부 (월정)	서부 (판포)	보목	색달	성산	대정	남원	비고
설치여부	시행중	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공	‘07.6월완료	‘07.6월완료	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공	고도처리공법으로 시공
사업비 (백만원)	43,341	-	-	10,000	7,980	-	-	-

ꏅ 제주(도두)처리장 고도처리시설 추진상황

❍ 사업개요

□ 사업기간 : 2004년 ～ 2009년

□ 사업규모 : 고도처리시설 1식(Q=130,000㎥/일)

□ 사 업 비 : 43,341 백만원 (국고 21,671, 지방비 21,670)

- ‘08년 사업비 : 13,620백만원 (국고 6,601,  지방비 7,019)

❍ 추진상황

□ ‘04. 08. 2 환경관리공단과 사업수행 위․수탁 협약 체결

□ ‘04. 11. 26 ～ 05. 3. 25 기본계획 및 입찰안내서 작성용역

□ ‘05. 04. 19 지방재정․ 투 융자사업 (중앙심의)

□ ‘05. 09. 25 고도처리시설 설치 인가

□ ‘05. 11. 14 고도처리시설 설치공사 입찰 공고(설계․시공 일괄)

□ ‘06. 09. 12 재원협의

□ ‘06. 11. 21 공사 착공(08. 10월 현재 공정율 82%)

❍ 향후 추진계획

□ ‘09. 1 ～ 5월 시운전 및 마무리 공사

□ ‘09. 05. 20 공사 준공

❍ 기대효과

□ 고도처리시설에 따른 질소․인 제거로 청정해역 보전

□ 처리수질 향상에 따른 하수처리수 방류로 인한 오염원인 감소

49. 하수도 원인자 부담금 부과 및 징수현황(최근 3년간)

❏ 공기업특별회계(제주시 동지역)

(2008. 10. 30현재)                                                        (단위 : 건, 천원)

년도별	부 과 액		징 수 액		미 수 금 액						비 고 (징수율) %
	건수	금 액	건수	금 액	계		납기미도래		납기후체납액
					건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	1,271	17,382,981	900	12,213,127	371	5,169,854	357	5,124,032	14	45,822	99.6
2008년	82	2,275,857	30	748,549	52	1,527,308	52	1,527,308	-	-	100
2007년	431	5,614,508	291	3,018,479	140	2,596,029	136	2,583,340	4	12,689	99.6
2006년	758	9,492,616	579	8,446,099	179	1,046,517	169	1,013,384	10	33,133	99.6

※ 징수율 : 납기미도래분 불포함

❏ 하수도사업특별회계(서귀포시 동지역)

(2008. 10. 30현재)                                                        (단위 : 건, 천원)

년도별	부 과 액		징 수 액		미 수 금 액						비 고 (징수율) %
	건수	금 액	건수	금 액	계		납기미도래		납기후체납액
					건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	466	20,198,666	465	20,190,928	1	7,738	1	7,738	-	-	100
2008년	34	6,744,428	33	6,736,690	1	7,738	1	7,738	-	-	100
2007년	230	6,071,968	230	6,071,968	-	-	-	-	-	-	100
2006년	202	7,382,270	202	7,382,270	-	-	-	-	-	-	100

※ 징수율 : 납기미도래분 불포함

❏ 일반회계(서귀포시 읍․면지역)

(2008. 10. 30현재)                                                        (단위 : 건, 천원)

년도별	부 과 액		징 수 액		미 수 금 액						비 고 (징수율) %
	건수	금 액	건수	금 액	계		납기미도래		납기후체납액
					건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	148	6,392,238	148	6,392,238	-	-	-	-	-	-	100
2008년	11	3,605,965	11	3,605,965	-	-	-	-	-	-	100
2007년	75	1,398,299	75	1,398,299	-	-	-	-	-	-	100
2006년	62	1,387,974	62	1,387,974	-	-	-	-	-	-	100

50. 하수관거정비사업 추진상황(재정사업)

<제주시지역>

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계			L=36.4km	34,130
동지역			L=23.5km	23,870
	용담1동	제주시 동지역 하수관거 정비공사(1공구)	L=9.7km	9,810	‘08. 1 ~ ‘09. 3	55%
	오라동		L=1.0km	1,839	‘08. 1 ~ ‘09. 3	65%
	이도2동 (도남동)	제주시 동지역 하수관거 정비공사(2공구)	L=8.6km	7,925	‘08. 1 ~ ‘09. 3	42%
	삼도1동		L=4.2km	4,296	‘08. 1 ~ ‘09. 3	28%
읍면지역			L=12.9km	10,260
	한림읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(한림처리분구)	L=0.5km	512	‘08. 9 ~ ‘09. 1	25%
	애월읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(애월처리분구)	L=4.3km	3,415	‘08. 9 ~ ‘09. 1	25%
	구좌읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(구좌처리분구)	L=4.8km	3,811	‘08. 9 ~ ‘09. 1	25%
	조천읍	제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(조천처리분구)	L=1.4km	1,152	‘08. 9 ~ ‘09. 1	25%
	한경면	제주시 읍면지역 하수관거 정비공사(한경처리분구)	L=1.9km	1,370	‘08. 9 ~ ‘09. 1	25%

<서귀포시지역>

읍면동별		사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	진도	비고
합 계			L=37.3km	20,778
동 지 역			L=21.2km	11,207
	송산동	보목지구 하수관거정비사업	L=1.6km	612	‘08.2.21 ~08.8.20	준공
	천지동	걸매공원일원 하수관거 시설공사	L=0.3km	91	‘07.12.20 ~‘08.4.15	준공
	효돈동	효돈지구 하수관거정비사업	L=2.1km	1,947	‘07.12.18 ~08.10.17	준공
	영천동	토평지구 하수관거정비사업	L=1.2km	1,629	‘08.3.4 ~‘08.11.3	98%
		법호촌지구 하수관거정비사업	L=0.7km	356	‘08.2.12 ~08.7.11	준공
		동상효지구 하수관거정비사업	L=1.8km	992	‘08.2.12 ~‘09.2	90%
	동홍동	동홍동(굴왓모루)하수관거시설공사	L=0.6km	126	‘07.12.20 ~‘08.5.17	준공
		동홍지구 하수관거시설공사	L=0.4km	400	'08.11. ~'09.2	발주
	대륜동	서호호근지구 하수관거정비사업	L=4.4km	1,825	‘08.3.4 ~‘08.11.3	99%
		법환지구 하수관거시설공사	L=2.9km	700	‘08.7.1 ~‘09.2	45%
	중문동	중문지구하수관거정비공사	L=0.2km	295	'08.11. ~'09.2	발주
	예래동	색달지구 하수관거정비사업	L=0.9km	453	‘08.2.20 ~08.7.19	준공
		예래중동지구 하수관거정비사업	L=2.2km	1,029	‘08.2.18 ~09.2	90%
		상예우남지구 하수관거정비사업	L=1.9km	752	‘08.2.20 ~‘08.10.19	준공
읍 면 지 역			L=16.1km	9,571
	대정읍	안덕~대정간 도로확장 및 포장구간 하수관거정비공사	L=1.4km	309	‘08.4.28 ~‘08.7.27	준 공
		대정1공구 하수관거 정비공사	L=4.5km	2,039	‘08.7.2 ~‘08.12.29	65%
		대정2공구 하수관거 정비공사	L=3.1km	1,674	‘08.7.23 ~‘08.12.30	65%
	성산읍	성산1공구 하수관거 정비공사	L=1.8km	1,855	‘08.7.23 ~‘08.12.30	65%
		성산2공구 하수관거 정비공사	L=3.2km	2,383	‘08.6.30 ~‘08.12.27	65%
	안덕면	안덕1공구 하수관거 정비공사	L=2.1km	1,311	‘08.7.23 ~‘08.12.30	65%

51. 하수관거 현황

ꏅ 하수관거 시설율

(2007. 12월말 현재)

구 분	계	제 주 시			서귀포시			비 고
		소 계	동지역	읍면지역	소 계	동지역	읍면지역
계획연장A(km)	3,969	2,488	1,568	920	1,481	838	643
시설연장B(km)	2,929	1,776	1,164	612	1,153	618	535
시설율(%)	73.8	71.4	74.2	66.5	77.9	73.7	83.2	B/A*100

ꏅ 하수관거 우ㆍ오수 분리율

(2007. 12월말 현재)

구 분	계	제 주 시			서귀포시			비 고
		소 계	동지역	읍면지역	소 계	동지역	읍면지역
시설연장A(km)	2,929	1,776	1,164	612	1,153	618	535
분류식B(km)	1,405	741	530	211	664	484	180
합류식C(km)	1,524	1,035	634	401	489	134	355
분리율(%)	47.9	41.7	45.5	34.5	57.6	78.3	33.6	B/A*100

ꏅ 우ㆍ오수분리 소요사업비

구 분		계	제 주 시			서귀포시			비 고
			소 계	동지역	읍면지역	소 계	동지역	읍면지역
사업량(km)		2,564	1,747	1,038	709	817	354	463
사업비(억원)		11,505	7,835	4,649	3,186	3,670	1,590	2,080
	08 재정	395	234	131	103	161	65	96
	09 재정	390	195	84	111	195	75	120
	BTL (06, 08, 09)	3,860	3,065	1,134	1,931	795	―	795
	향후	6,860	4,341	3,300	1,041	2,519	1,450	1,069

52. 하수관거(분류식)사업 추진상황

❍ 제주시

공사명	사업개요	예산액 (백만원)	사업기간	추진상황	비고
계	오ㆍ우수분류 L=87.1km	82,200
동지역 하수관거 정비사업	오ㆍ우수분류 L= 47.1Km	48,000	2008. 1~ 2010. 8	35%
읍면지역 하수관거 정비사업	오ㆍ우수분류 L= 40Km	34,200	2008. 9~ 2011. 9	15%

❍ 서귀포시

공사명	사업개요	예산액 (백만원)	사업기간	추진상황	비 고
계	우․오수분류 L=100.2km	50,748
동지역 하수관거 정비사업	우․오수분류 L=29.8km	13,993	2008. 2 ~2009. 12	55%
읍면지역 하수관거 정비사업	우․오수분류 L=70.4km	36,755	2008. 6 ~20010. 12	20%

53. 하수처리장 방류수 재이용사업 추진상황

ꏅ 사업개요

❍ 위    치 :  제주시 한경면 판포리(판포하수처리장내)

❍ 사업규모

- 시설용량 : Q=5,000톤/일    - 재염이용시설 : 1식

- 송․배수관로 : L=9.8km     - 저류조 : 1,000톤 1개소

❍ 총사업비 : 5,500백만원(국비 70%, 지방비 30%)

- ‘08년 사업비 : 1,000백만원(국비 700, 지방비 300)

❍ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2009. 12. 31

ꏅ 추진상황 및 향후계획

❍ ‘08.  1. 14 : 농어촌공사 업무 위․수탁협약체결

❍ ‘08.  3 ～ 6 : 타당성 검토 및 기본계획 수립

❍ ‘08.  6. 13 : 주민설명회

❍ ‘08.  9. 19 : 실시설계 완료

❍ ‘08. 10. 20 : 공사 착공

ꏅ 향후계획

❍ ‘09. 12. 31 : 공사준공

ꏅ 기대효과

❍ 하수처리수를 재이용함으로서 농경지 농업용수 문제 해결

❍ 농업용수 지하수 의존율 감축으로 장래 물 부족 사태에 능동적 대처

54. 하수처리장 수질 TMS 자동측정기 설치사업 추진상황

ꏅ 근 거

❍ 하수처리장에서 배출되는 수질오염 물질을 실시간 자동으로 확인

❍ 국가 및 지방자치단체에서 운영하는 하수처리장 및 폐수처리장에 수질원격감시체계(TMS)설치 법제화

❍『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조의 2에 의거 공공 하수처리시설에는 수질원격감시체계(TMS)구축 의무화

※ ‘07. 5월 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』이 개정되면서 제38조의2조항 신설

❍ 용량별 설치 의무기간

□ 100,000㎥/일 이상 : ‘08년 5월 19일까지(도두)

□ 10,000㎥/일 이상 100,000㎥/일 미만 : ‘08.11.19일까지(보목, 색달)

□ 2,000㎥/일 이상 10,000㎥/일 미만 : ‘09.11.19일까지(동부,서부,성산,대정,남원)

☞ TMS(Tele-Monitoring System) : 방류수에 대한 수질을 실시간으로 측정한뒤 데이터를 환경관리공단 관제센터에 자동 통보해 수질을 관리하는 시스템

- 수질기준 : BOD 10, COD 40, SS 10, T-N 20, T-P 2,대장균1,000이하

ꏅ TMS 설치현황

구분	계	도두	동부 (월정)	서부 (판포)	보목	색달	성산	대정	남원
시설용량 (㎥/일)	197,000	130,000	6,000	6,000	20,000	15,000	4,000	8,000	8,000
설치여부	8개소중 4개소 설치완료	완료 (‘08.5월)	‘09년 설치예정	‘09년 설치예정	‘08.11월준공예정	‘08.11월준공예정	‘09년 설치예정	‘09년 설치예정	완료 (시설공사에포함)
사업비 (백만원)	1,871	271	250	250	300	300	250	250	-

□ 향후계획

○ 동부, 서부, 대정, 성산하수처리장설치

□ 사 업 비 : 1,000백만원(250백만원 * 4개소)

□ 사 업 량 : 수질원격감시시스템 각 1식

□ 사업기간 : 2009. 01 ~ 2009. 11

□ 기대효과

○ TMS구축으로 화학적 산소요구량은 물론 부유물질과 총 질소, 총인 등 오염원과 유량 등을 시간별로 분석해 수질개선 및 수질오염사고 사전예방

○ 하수처리의 선진·과학화를 통한 하수도 기초자료 확보 및 행정의 투명성 제고

55. 하수처리시설 주변 생태계 보전사업 추진상황

지원사업명	사업내용	사업기간	사업비	비고
계			39,900천원
마을어장피해에 따른 자원회복사업 (태풍“나리”피해)	어장 갯닦이 사업 1식	‘08.3,18~ 6.19	30,000천원	삼양동 어촌계
마을어장피해에 따른 자원회복사업	어장 갯닦이 사업 1식	‘08.9.1 ~ 9.30	9,900천원	삼양동 어촌계

56. 보목하수처리장 정밀기술진단 결과

❍ 공공 환경시설은 관계법령에서 정해진 진단주기(매5년)마다 기술 진단 실시 의무

❍ 공공환경시설의 고장예방과 적정운영을 도모하여 수명연장 및 처리 효율 개선

ꏅ 근거법령

□ 『하수도법』 제20조 및 동법시행규칙 제14조

ꏅ 시설현황

위 치	처리용량	처리방법	사업비	비고
보목동 1429	20,000㎥/일	B3공법	55,718천원

ꏅ  추진상황

❍ 환경관리공단 기술진단 사업 추진중(2008.8.18~2008.12.05)

ꏅ  기대효과

❍ 처리시설 공정별 문제점 및 개선방안을 종합적으로 진단.

❍ 환경기초시설의 고장을 예방하고 처리효율을 항상시켜 적정운영 도모

57. 하수처리장별 근무 인력현황

처리장명 (위생처리장)	시설용량 (천톤/일)	직원총수 (명)	행정	기술직					기능직 및 기타				주요 업무
				계	시설	공업	환경	기타	소계	기능	청경	무기
계	197.13	120	1	30	3	18	5	4	89	47	8	34
제주(도두)	130	33	1	7	1	5	1	-	25	11	5	9	하수처리장운영관리
동부(월정)	6	12	-	2	-	2	-	-	10	4	2	4	“
서부(판포)	6	12	-	3	1	1	1	-	9	6	-	3	“
보목	20	14	-	4	-	2	-	2	10	7	-	3	“
색달	15	11	-	2	-	1	1	-	9	6	-	3	“
성산 (신산위생처리장포함)	4	13	-	5	1	3	1	-	8	2	-	6	“
남원	8	8	-	1	-	-	1	-	7	5	-	2	“
대정 (대정위생처리장포함)	8	11	-	4	-	2	-	2	7	4	-	3	“
(호근)	0.13	6	-	2	-	2	-	-	4	2	1	1	위생처리장운영관리

58. 하수처리장 최종 방류수 수질현황

○ 방류수 수질기준

구 분	생물화학적 산소요구량 (BOD)(mg/L)	화학적 산소요구량 (COD)(mg/L)	부 유 물 질 (SS)(mg/L)	총 질소 (T-N)(mg/L)	총 인 (T-P)(mg/L)	총대장균 군수(개/mL)
특정지역기준	10이하	40이하	10이하	20이하	2이하	3,000 이하
기타지역기준	20이하	40이하	20이하	60이하	8이하

※ 2008년1월1일 부터는 특정지역기준 적용하되, 겨울철(12월1일~3월31일)에는 총 질소와         총인에 대하여는 기타지역기준을 적용

○ 2006년(제주하수처리장)

월별	구 분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	95,837	9.7	10.0	8.6	20.871	2.177	71
	최고	149,584	16.4	14.6	17.6	36.692	3.611	380
	최저	78,970	2.8	7.4	3.2	7.185	0.942	30
1월	평균	91,357	8.9	10.4	11.3	14.906	1.967	30
	최고	119,712	10.2	12.0	13.2	21.205	2.879	30
	최저	78,970	5.4	9.6	8.6	7.185	1.230	30
2월	평균	94,651	9.5	10.6	9.4	20.737	1.791	30
	최고	131,878	13.3	12.8	14.6	34.560	2.575	30
	최저	83,295	5.3	8.6	6.0	13.484	0.942	30
3월	평균	91,881	9.4	11.1	8.1	21.401	2.194	30
	최고	116,556	15.1	13.4	14.0	34.027	2.867	30
	최저	82,598	5.0	9.2	5.0	13.172	1.835	30
4월	평균	95,360	8.6	9.9	6.8	20.928	2.106	30
	최고	129,491	14.1	11.8	13.2	27.829	2.726	30
	최저	87,838	4.1	8.6	3.8	11.744	1.321	30
5월	평균	98,194	8.0	10.1	8.6	20.124	2.283	48
	최고	136,542	13.6	11.8	17.0	27.490	2.882	145
	최저	86,709	3.8	8.5	5.0	10.517	0.996	30
6월	평균	99,343	7.1	9.5	6.0	19.296	2.041	124
	최고	127,239	13.5	10.6	10.8	27.013	3.040	240
	최저	89,133	2.8	8.2	3.2	14.147	1.140	38
7월	평균	105,088	9.8	8.9	6.6	19.864	2.177	207
	최고	137,900	13.3	11.0	12.4	23.425	2.853	380
	최저	93,091	6.3	7.6	3.6	12.520	1.258	94
8월	평균	99,283	11.5	9.9	9.1	21.467	2.201	138
	최고	115,701	16.4	14.6	13.8	29.567	3.054	370
	최저	89,607	4.4	8.5	4.6	16.780	1.741	30
9월	평균	102,231	10.4	9.1	9.0	20.407	1.851	117
	최고	149,584	13.6	10.5	17.6	28.429	3.057	280
	최저	90,398	5.4	7.4	5.6	9.263	1.283	30
10월	평균	91,935	10.7	9.9	9.7	23.269	2.548	30
	최고	108,290	13.5	12.9	14.0	32.121	3.448	30
	최저	85,262	8.4	7.8	5.8	18.469	1.094	30
11월	평균	91,654	12.2	10.8	9.6	22.196	2.604	30
	최고	124,236	16.2	12.9	16.0	34.386	3.268	30
	최저	81,951	7.6	8.5	4.4	14.957	1.799	30
12월	평균	89,124	10.8	10.2	8.9	25.826	2.321	30
	최고	135,908	16.4	12.2	16.6	36.692	3.611	30
	최저	81,780	6.0	8.6	4.4	18.497	1.087	30

○ 2006년(보목하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	12,742	8.4	9.6	6.4	17.468	1.584	71
	최고	21,818	18.4	18.9	17.1	24.141	2.476	330
	최저	7,991	4.4	5.3	1.8	7.260	0.268	28
1월	평균	11,780	7.2	6.7	6.2	17.565	1.563	44
	최고	17,472	8.0	7.1	8.3	21.068	2.000	64
	최저	9,371	5.6	6.3	4.0	14.342	1.055	28
2월	평균	11,865	7.5	7.0	6.5	17.712	1.532	47
	최고	15,231	8.8	7.7	7.5	21.213	1.961	65
	최저	10,361	6.4	6.3	4.9	15.030	1.270	30
3월	평균	11,317	6.7	8.7	5.3	18.157	1.716	49
	최고	19,219	8.8	11.6	6.2	22.107	2.021	83
	최저	10,098	4.4	7.2	4.0	13.826	1.062	30
4월	평균	11,644	7.2	9.8	4.5	18.573	1.775	53
	최고	18,073	9.6	12.4	6.0	21.638	2.284	75
	최저	9,744	5.0	8.4	3.4	15.692	1.219	30
5월	평균	12,025	7.2	9.8	4.9	19.141	1.887	40
	최고	18,745	9.2	12.5	17.1	24.141	2.316	74
	최저	9,591	5.8	7.9	3.2	13.273	1.025	30
6월	평균	12,767	6.7	10.4	4.7	19.634	1.925	51
	최고	18,924	8.4	13.2	6.1	23.416	2.350	94
	최저	10,419	5.4	9.0	3.1	16.639	1.486	30
7월	평균	15,671	7.5	9.5	4.1	19.583	1.945	73
	최고	19,917	9.6	14.2	7.3	23.317	2.476	94
	최저	11,875	6.2	6.9	3.0	17.044	1.638	46
8월	평균	16,160	7.0	8.7	4.9	17.363	1.588	66
	최고	21,818	9.6	13.0	8.9	22.529	2.107	86
	최저	7,991	5.8	5.3	3.3	12.507	1.004	45
9월	평균	14,535	12.1	11.7	9.6	15.708	1.355	132
	최고	19,468	18.4	18.9	16.4	21.417	2.070	330
	최저	12,825	5.6	5.3	1.8	7.260	0.567	60
10월	평균	11,883	11.9	12.1	12.3	16.379	1.603	167
	최고	16,687	15.6	15.3	14.8	21.203	2.248	270
	최저	10,716	6.0	9.9	1.8	10.694	0.949	85
11월	평균	11,608	10.0	10.0	6.6	16.155	1.175	77
	최고	18,562	12.8	12.1	9.2	22.726	2.018	150
	최저	9,747	7.7	7.8	3.5	10.521	0.564	40
12월	평균	11,646	9.4	10.3	7.3	13.645	0.947	53
	최고	14,428	12.9	13.3	13.6	19.357	2.157	80
	최저	10,232	6.7	7.6	4.9	10.236	0.268	40

○ 2006년(색달하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	6,843	12.6	13.1	8.3	17.591	2.534	192
	최고	10,436	18.4	18.9	18.4	34.573	6.690	700
	최저	4,273	2.8	7.9	2.0	6.308	0.279	30
1월	평균	6,259	10.4	13.2	5.7	21.352	2.721	86
	최고	9,113	14.4	14.8	8.0	26.222	4.016	130
	최저	4,273	5.8	8.2	3.2	13.528	1.382	30
2월	평균	6,411	12.3	13.5	6.4	14.244	3.540	101
	최고	8,548	14.1	14.9	9.6	22.147	4.727	150
	최저	5,156	8.4	11.5	3.8	10.254	2.553	50
3월	평균	6,316	12.8	12.7	8.1	10.598	3.318	119
	최고	9,005	14.4	15.5	11.8	13.928	4.630	180
	최저	5,017	6.6	7.9	5.4	8.627	1.201	60
4월	평균	7,073	12.9	13.4	8.5	15.351	3.477	120
	최고	9,106	14.4	15.1	11.2	28.260	6.333	180
	최저	5,447	7.6	8.4	5.4	6.953	0.793	60
5월	평균	7,169	12.1	14.4	9.7	21.767	2.336	129
	최고	8,819	14.4	15.7	13.2	34.573	5.765	190
	최저	4,599	5.8	11.8	6.2	10.797	1.080	30
6월	평균	7,064	13.8	14.0	9.8	20.848	2.183	154
	최고	8,273	15.3	16.5	13.7	30.000	3.274	240
	최저	4,741	11.7	10.3	4.8	11.778	0.668	100
7월	평균	8,506	13.8	14.3	9.7	23.369	2.010	211
	최고	9,351	16.5	18.1	17.6	31.112	3.334	320
	최저	7,381	10.2	10.6	4.8	15.988	0.600	100
8월	평균	9,048	10.8	11.8	7.6	19.380	1.379	140
	최고	10,242	14.4	18.9	15.8	28.842	2.935	260
	최저	7,373	5.4	9.3	4.4	13.292	0.279	30
9월	평균	7,320	13.4	12.5	7.8	24.287	2.264	225
	최고	10,436	18.4	17.9	14.2	29.615	3.007	590
	최저	5,882	4.8	8.0	3.8	16.576	1.695	30
10월	평균	6,011	14.1	11.2	6.0	15.258	2.505	436
	최고	7,523	18.4	15.7	10.2	28.266	4.158	600
	최저	5,121	5.6	8.8	2.0	6.308	1.052	180
11월	평균	5,599	12.1	12.2	10.2	12.293	2.276	254
	최고	7,468	17.1	15.8	18.4	17.569	3.467	680
	최저	4,964	8.0	9.2	3.4	6.773	1.124	40
12월	평균	5,286	13.2	13.5	10.5	12.341	2.398	324
	최고	6,543	15.9	18.8	16.8	20.868	6.690	700
	최저	4,774	2.8	8.3	6.0	7.301	1.363	30

○ 2006년(대정하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	2,942	3.9	6.6	7.4	8.877	1.341	36
	최고	8,154	19.4	22.3	19.5	10.840	2.021	648
	최저	1,368	1.4	2.7	2.5	6.229	0.432	13
1월	평균	2,187	4.1	7.7	6.9	7.574	0.925	27
	최고	3,716	7.9	8.1	9.5	8.910	1.002	33
	최저	1,705	3.7	6.6	4.5	7.056	0.557	22
2월	평균	2,167	4.0	7.4	7.8	8.338	0.971	22
	최고	2,992	7.2	8.7	11.0	9.372	1.006	30
	최저	1,774	3.3	5.6	4.0	7.158	0.753	15
3월	평균	2,262	3.7	6.0	6.4	9.319	1.141	31
	최고	4,006	4.1	8.1	9.5	10.840	1.986	46
	최저	1,368	3.1	4.7	3.5	6.902	0.689	13
4월	평균	2,898	3.7	6.4	7.0	8.897	1.379	38
	최고	7,771	4.7	9.1	9.5	10.721	1.994	73
	최저	1,984	2.9	4.3	3.5	7.174	0.844	20
5월	평균	2,827	4.0	7.0	7.8	8.808	1.377	31
	최고	6,281	8.3	10.4	13.5	9.966	2.010	43
	최저	2,021	3.1	5.6	3.5	6.229	0.789	15
6월	평균	3,056	4.6	7.0	7.7	9.049	1.614	46
	최고	6,729	8.1	9.2	13.0	9.874	2.020	192
	최저	1,994	3.2	5.7	3.5	7.214	0.913	22
7월	평균	4,457	6.8	9.2	9.5	8.921	0.996	29
	최고	8,154	19.4	22.3	19.5	10.277	1.993	648
	최저	2,163	3.3	5.6	4.5	6.812	0.432	19
8월	평균	3,663	3.4	6.6	8.7	9.398	1.653	34
	최고	5,299	5.0	8.7	14.5	10.143	2.013	79
	최저	3,101	2.2	5.5	3.5	8.488	0.914	20
9월	평균	3,680	4.0	7.0	8.3	9.448	1.439	49
	최고	7,892	9.5	11.7	13.5	9.989	2.021	71
	최저	2,539	2.2	4.9	5.0	7.348	0.594	16
10월	평균	2,563	2.9	5.3	6.8	8.967	1.432	40
	최고	3,857	4.2	7.9	11.0	9.920	2.002	62
	최저	2,101	2.2	3.9	4.0	7.056	0.557	24
11월	평균	2,808	3.1	5.3	6.2	8.945	1.589	42
	최고	4,816	4.3	7.5	9.0	9.896	2.005	67
	최저	2,088	2.4	4.3	2.5	7.278	0.577	25
12월	평균	2,680	2.5	4.7	5.6	8.860	1.572	44
	최고	3,380	4.1	6.7	9.5	9.892	2.003	62
	최저	2,152	1.4	2.7	2.5	7.213	0.771	24

○ 2006년(성산하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	1,464	2.1	9.4	2.5	8.361	1.386	<30
	최고	3,688	4.3	13.0	4.4	20.129	1.870	<30
	최저	930	1.0	6.2	1.0	5.695	0.790	<30
1월	평균	1,471	2.5	8.4	2.8	8.027	1.167	<30
	최고	2,621	3.2	11.2	4.4	10.925	1.452	<30
	최저	1,180	1.2	6.2	1.0	5.925	0.790	<30
2월	평균	1,303	2.5	8.8	3.2	8.943	1.381	<30
	최고	2,246	4.3	10.7	4.4	20.129	1.870	<30
	최저	930	1.3	6.7	1.4	5.695	1.063	<30
3월	평균	1,280	2.3	9.0	2.8	8.296	1.434	<30
	최고	2,226	3.1	11.7	4.2	9.374	1.596	<30
	최저	1,028	1.9	7.6	1.6	7.075	1.258	<30
4월	평균	1,471	2.2	10.4	2.9	8.035	1.432	<30
	최고	3,688	3.0	12.8	3.6	8.914	1.607	<30
	최저	1,109	1.0	8.0	1.8	6.960	1.261	<30
5월	평균	1,485	1.9	10.2	2.5	7.979	1.426	<30
	최고	3,232	2.3	12.0	3.8	8.626	1.517	<30
	최저	1,098	1.1	7.9	1.8	7.132	1.330	<30
6월	평균	1,587	2.1	9.8	2.5	8.094	1.399	<30
	최고	3,155	2.7	12.0	3.6	8.569	1.499	<30
	최저	1,098	1.4	7.7	1.4	7.420	1.286	<30
7월	평균	1,611	2.1	9.2	2.5	8.133	1.407	<30
	최고	2,805	2.7	10.8	3.4	8.971	1.495	<30
	최저	1,007	1.1	6.9	1.6	6.787	1.290	<30
8월	평균	1,739	2.0	9.5	2.2	8.738	1.461	<30
	최고	2,523	2.5	11.1	3.2	10.580	1.636	<30
	최저	1,324	1.6	7.7	1.6	7.707	1.359	<30
9월	평균	1,521	1.9	10.1	2.2	9.253	1.515	<30
	최고	2,214	2.5	12.3	3.0	10.408	1.611	<30
	최저	1,106	1.4	7.7	1.6	8.224	1.427	<30
10월	평균	1,407	2.0	11.4	2.2	9.062	1.386	<30
	최고	2,294	2.6	13.0	3.0	10.351	1.625	<30
	최저	1,096	1.4	10.0	1.4	8.434	1.264	<30
11월	평균	1,362	2.2	8.3	2.4	8.051	1.306	<30
	최고	2,359	2.6	9.7	3.6	8.721	1.618	<30
	최저	1,143	1.8	7.0	1.4	7.380	1.198	<30
12월	평균	1,322	1.9	7.2	1.8	7.777	1.325	<30
	최고	2,348	2.3	8.4	2.8	8.482	1.618	<30
	최저	1,130	1.5	6.4	1.2	7.237	1.198	<30

○ 2007년(제주하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	90,262	8.8	10.4	7.8	21.043	1.971	139
	최고	127,389	15.4	17.0	14.8	39.461	4.549	600
	최저	27,320	2.0	4.2	2.0	5.210	0.181	30
1월	평균	90,394	10.0	10.4	8.1	19.493	2.210	30
	최고	120,241	14.6	12.4	12.6	24.403	3.461	30
	최저	81,174	6.6	8.0	5.8	12.718	1.182	30
2월	평균	85,416	9.2	10.3	8.3	25.733	2.266	30
	최고	114,187	15.0	14.4	13.8	34.775	3.117	30
	최저	71,720	2.0	7.4	3.0	18.990	1.067	30
3월	평균	89,940	6.9	9.5	7.3	20.160	2.466	30
	최고	115,211	9.5	11.3	12.8	31.971	4.549	30
	최저	82,736	4.3	8.0	3.4	15.586	1.129	30
4월	평균	88,318	7.6	10.8	7.7	25.824	1.495	35
	최고	101,697	12.3	13.6	13.8	39.362	2.632	80
	최저	83,537	3.2	9.3	2.0	12.575	0.181	30
5월	평균	88,899	7.3	10.5	7.0	24.370	1.623	202
	최고	100,037	9.4	17.0	12.0	39.461	2.862	600
	최저	77,075	3.9	5.1	2.6	13.834	0.639	30
6월	평균	90,476	8.0	10.7	7.8	20.345	1.906	30
	최고	108,907	10.7	16.2	11.6	30.584	3.004	30
	최저	83,815	2.8	4.2	3.8	11.670	0.300	30
7월	평균	97,692	8.5	10.2	7.0	19.820	2.103	180
	최고	125,959	12.1	13.1	9.9	29.240	3.015	500
	최저	90,104	4.5	7.5	3.8	10.676	0.858	30
8월	평균	97,779	8.1	10.1	7.0	19.087	2.068	260
	최고	116,504	11.9	14.9	13.0	29.718	3.243	450
	최저	86,877	3.8	8.0	4.0	9.074	1.142	100
9월	평균	84,751	8.3	9.4	7.5	18.695	2.202	215
	최고	127,389	12.2	12.0	10.4	27.217	3.321	450
	최저	27,320	5.4	6.5	3.3	5.210	1.445	30
10월	평균	91,529	9.7	9.4	8.0	22.413	2.236	355
	최고	116,700	12.9	11.7	14.8	35.575	3.246	500
	최저	85,595	6.4	4.4	3.6	9.525	1.296	150
11월	평균	86,882	11.3	11.4	8.6	18.799	1.595	193
	최고	91,415	13.8	15.0	12.0	27.446	2.147	400
	최저	82,343	7.8	7.8	3.8	9.413	0.660	80
12월	평균	90,251	10.5	12.2	9.7	17.782	1.483	104
	최고	111,673	15.4	16.2	14.0	24.726	2.808	400
	최저	82,855	7.8	8.0	5.5	11.455	0.347	30

○ 2007년(동부하수처리장, 7월이후 가동)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	2,434	4	6	4	8	1	30
	최고	10,214	11	12	19	13	2	30
	최저	460	1	3	0	1	0	0
7월	평균	2,267	4.3	7.0	4.9	6.961	0.966	<30
	최고	6,936	10.6	11.2	18.8	11.523	1.825	<30
	최저	1,377	1.4	4.2	0.4	3.114	0.205	<30
8월	평균	2,836	3.9	6.5	3.5	5.741	0.888	<30
	최고	8,528	7.6	9.3	8.0	10.016	1.700	<30
	최저	655	1.3	3.9	0.8	1.817	0.227	<30
9월	평균	3,919	3.3	1.9	3.6	6.943	0.860	<30
	최고	10,214	6.2	8.5	8.0	10.500	1.700	<30
	최저	694	1.9	3.3	0.8	1.400	0.600	<30
10월	평균	2,164	4.6	6.5	3.7	9.568	0.971	<30
	최고	5,442	8.3	9.1	6.8	13.200	1.500	<30
	최저	977	1.9	4.3	0.6	3.700	0.600	<30
11월	평균	1,623	5.0	7.1	3.7	10.017	1.293	<30
	최고	2,003	7.8	12.2	7.4	12.300	1.600	<30
	최저	1,245	2.6	5.0	1.6	8.000	1.000	<30
12월	평균	1,792	5.2	7.1	3.7	9.355	1.197	<30
	최고	4,195	7.8	10.9	7.8	12.000	1.500	<30
	최저	460	3.0	5.4	0.8	7.300	0.700	<30

○ 2007년(서부하수처리장, 7월이후 가동)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	3,033	5.6	7.2	5.3	8.252	1.111	＜ 30
	최고	5,154	8.1	11.1	8.1	11.156	1.697	＜ 30
	최저	1,768	3.9	4.8	2.9	5.377	0.689	＜ 30
7월	평균	3,596	3.3	5.4	5.1	9.411	1.352	＜ 30
	최고	8,054	5.4	7.8	8.0	11.157	1.677	＜ 30
	최저	2,698	2.2	3.2	3.0	8.657	0.839	＜ 30
8월	평균	3,595	7.1	9.0	6.9	6.830	1.677	＜ 30
	최고	5,489	9.0	16.4	9.0	9.187	1.880	＜ 30
	최저	2,797	6.0	6.2	3.8	3.147	1.435	＜ 30
9월	평균	3,603	4.4	5.4	5.1	3.396	1.897	＜ 30
	최고	5,814	5.9	9.2	7.0	4.635	3.546	＜ 30
	최저	2,542	3.0	4.3	3.4	2.345	1.198	＜ 30
10월	평균	2,918	5.9	6.6	4.6	7.000	0.900	＜ 30
	최고	5,168	9.6	11.0	9.6	12.500	1.900	＜ 30
	최저	841	3.0	3.0	2.4	2.500	0.400	＜ 30
11월	평균	2,234	6.2	7.5	4.2	9.233	0.430	＜ 30
	최고	2,708	9.5	10.8	5.6	10.866	0.633	＜ 30
	최저	1,016	4.3	5.7	2.2	6.444	0.054	＜ 30
12월	평균	2,231	6.9	9.1	5.8	13.642	0.411	＜ 30
	최고	3,688	9.2	11.5	9.6	18.588	0.546	＜ 30
	최저	715	5.0	6.5	2.4	9.168	0.207	＜ 30

○ 2007년(보목하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	13,738	8.5	8.7	6.8	11.456	1.097	87
	최고	20,780	18.8	15.8	17.2	23.520	2.215	150
	최저	9,967	1.4	3.4	1.6	1.320	0.040	40
1월	평균	11,943	11.0	11.1	9.3	13.290	0.816	57
	최고	17,563	14.2	14.7	12.6	16.770	1.552	82
	최저	9,967	8.5	8.6	7.4	10.057	0.040	40
2월	평균	12,588	12.1	10.9	8.6	15.531	0.886	73
	최고	17,026	17.4	15.8	12.4	23.520	1.697	91
	최저	10,683	8.0	7.9	5.6	10.227	0.210	49
3월	평균	12,011	14.9	11.2	11.6	12.915	0.956	86
	최고	20,216	18.8	14.8	17.2	17.425	1.952	100
	최저	10,617	10.5	7.9	7.2	5.524	0.190	70
4월	평균	11,876	14.1	10.8	12.8	11.032	0.387	91
	최고	14,755	16.8	13.5	16.4	14.505	1.250	110
	최저	10,563	10.4	8.6	7.0	8.450	0.220	68
5월	평균	12,447	7.1	10.9	7.4	9.923	1.560	108
	최고	17,115	13.3	15.2	14.0	14.618	2.215	140
	최저	10,128	4.1	8.1	2.4	1.320	0.300	74
6월	평균	12,926	3.0	8.4	3.3	10.356	1.576	89
	최고	18,844	5.8	10.9	5.4	13.013	2.153	120
	최저	11,344	1.4	6.0	1.9	7.954	0.825	71
7월	평균	15,774	5.5	7.5	4.5	10.672	1.226	89
	최고	19,228	9.6	9.8	9.5	14.210	1.537	120
	최저	12,083	2.8	5.2	1.6	5.483	0.763	69
8월	평균	16,524	7.1	7.4	5.6	10.529	0.963	94
	최고	19,863	9.3	9.8	9.6	13.421	1.370	150
	최저	14,716	3.1	3.5	2.2	6.367	0.357	60
9월	평균	16,877	5.4	6.5	4.2	10.019	1.163	87
	최고	20,780	9.6	9.8	8.2	13.713	1.402	120
	최저	12,790	3.2	4.1	2.3	7.613	0.903	62
10월	평균	16,106	6.4	5.9	4.1	11.033	1.126	88
	최고	19,320	9.7	8.1	7.5	16.032	1.543	120
	최저	13,465	3.4	3.4	2.6	8.093	0.486	65
11월	평균	13,815	7.6	5.8	4.7	10.836	1.297	90
	최고	15,560	8.8	8.9	7.3	14.645	1.831	120
	최저	11,208	5.9	3.5	3.1	8.074	1.043	61
12월	평균	11,872	8.4	7.5	5.3	11.338	1.210	89
	최고	14,395	9.3	9.4	8.3	13.725	1.542	120
	최저	10,940	7.2	5.2	3.7	9.406	1.004	60

○ 2007년(색달하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	6,591	10.5	12.9	8.9	15.963	1.771	180
	최고	9,442	19.5	22.6	19.2	30.904	4.348	670
	최저	4,687	2.7	5.0	2.8	4.490	0.133	50
1월	평균	5,648	11.7	11.8	7.6	20.040	1.330	240
	최고	8,783	12.6	15.0	15.6	24.376	1.226	670
	최저	4,912	7.1	8.9	3.0	15.401	0.329	109
2월	평균	5,547	14.0	14.8	12.1	19.860	2.070	230
	최고	6,636	19.2	21.6	19.0	25.930	2.855	301
	최저	4,687	3.3	9.9	4.8	12.446	0.759	150
3월	평균	5,747	17.0	17.3	14.7	20.710	2.230	230
	최고	7,141	19.5	22.6	19.2	30.904	4.199	310
	최저	5,028	14.0	14.2	5.8	14.624	0.405	180
4월	평균	5,842	14.8	15.6	10.8	13.450	1.550	190
	최고	6,796	18.5	18.2	18.8	26.730	3.980	290
	최저	5,009	11.2	10.8	5.0	4.490	0.622	90
5월	평균	6,338	10.7	11.4	8.2	12.910	2.330	150
	최고	9,199	18.5	14.4	14.0	22.344	4.348	220
	최저	5,677	4.5	5.0	2.8	6.490	0.303	80
6월	평균	6,489	8.1	12.8	8.3	20.520	2.900	120
	최고	7,938	11.8	16.5	12.8	27.206	3.722	170
	최저	5,455	3.4	10.2	5.6	15.634	1.932	50
7월	평균	7,987	8.0	13.3	9.6	16.980	1.730	90
	최고	9,442	11.2	19.0	13.8	21.187	2.971	150
	최저	4,998	5.8	10.3	3.2	12.093	1.012	50
8월	평균	8,300	7.8	11.7	7.9	14.160	1.250	230
	최고	9,413	9.9	15.8	9.8	19.997	1.927	310
	최저	7,175	6.0	7.2	5.0	5.059	0.133	170
9월	평균	7,532	8.9	11.5	7.6	13.250	1.390	150
	최고	9,289	9.9	17.0	10.0	18.492	1.849	220
	최저	5,466	5.6	7.8	4.0	9.929	0.606	90
10월	평균	7,409	9.0	14.3	7.2	13.520	1.400	210
	최고	8,417	10.0	17.1	9.4	19.997	1.927	310
	최저	6,261	6.5	11.8	3.6	5.211	0.750	110
11월	평균	6,220	8.3	11.7	7.1	13.890	1.550	170
	최고	8,271	9.8	15.0	10.0	18.528	1.938	320
	최저	5,240	2.7	8.5	3.2	7.846	0.903	90
12월	평균	5,924	7.8	8.7	6.5	12.550	1.560	100
	최고	7,248	9.8	10.1	9.4	17.688	1.991	170
	최저	4,809	4.1	6.5	3.0	5.335	1.119	50

○ 2007년(대정하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	3,682	4.9	7.4	9.9	10.566	1.457	76
	최고	15,905	28.5	24.5	40.5	36.487	2.811	457
	최저	1,290	1.3	2.1	1.5	4.741	0.317	34
1월	평균	2,933	3.4	6.2	8.0	9.685	1.609	56
	최고	5,037	8.8	14.8	18.0	19.615	2.196	108
	최저	2,438	1.3	3.7	2.5	6.230	0.858	39
2월	평균	2,863	3.5	6.6	8.5	9.942	1.658	67
	최고	3,830	7.2	12.4	15.0	17.210	2.196	91
	최저	2,281	1.8	3.8	4.0	6.872	0.593	40
3월	평균	3,175	3.9	6.3	9.2	9.585	1.619	86
	최고	6,856	9.0	14.5	18.5	14.201	1.933	335
	최저	1,290	2.1	3.9	5.0	7.332	0.778	50
4월	평균	3,105	3.3	5.6	8.7	9.123	1.781	57
	최고	4,636	7.6	9.9	14.0	9.931	2.482	76
	최저	2,423	2.4	4.3	5.5	5.558	0.580	38
5월	평균	3,321	5.6	7.9	11.6	10.435	1.482	58
	최고	6,276	14.9	16.7	19.0	19.749	2.414	155
	최저	2,854	2.4	4.1	6.0	8.140	0.917	34
6월	평균	3,294	3.9	6.8	12.1	18.388	1.705	60
	최고	5,534	13.5	15.8	17.0	36.487	2.200	88
	최저	1,919	2.6	4.5	8.0	9.103	0.916	39
7월	평균	5,772	14.1	15.4	18.0	9.136	1.230	156
	최고	15,905	28.5	24.5	40.5	19.367	2.811	457
	최저	2,078	2.9	4.3	7.0	4.741	0.317	50
8월	평균	4,133	5.5	8.4	11.3	9.412	1.231	79
	최고	8,452	11.7	16.1	18.0	11.094	2.000	258
	최저	3,035	2.4	4.2	6.0	7.225	0.774	37
9월	평균	4,049	5.1	8.4	9.9	9.218	1.040	75
	최고	7,115	12.9	17.4	24.5	12.223	1.977	160
	최저	2,967	2.4	5.0	6.0	5.455	0.444	39
10월	평균	3,919	4.0	6.4	8.4	9.425	1.461	67
	최고	5,312	14.9	12.2	19.0	10.606	1.997	340
	최저	1,586	2.4	4.3	2.5	6.130	0.451	35
11월	평균	4,099	2.7	5.1	6.7	10.551	1.486	66
	최고	4,933	4.0	7.0	9.0	15.642	2.003	133
	최저	2,771	2.1	2.1	4.5	8.638	0.881	44
12월	평균	3,637	3.2	5.3	6.4	11.897	1.176	79
	최고	4,383	4.9	8.7	13.5	14.631	1.987	120
	최저	2,765	2.3	3.9	1.5	9.004	0.865	57

○ 2007년(성산하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	1,471	2.0	7.5	2.2	9.138	1.639	<30
	최고	3,726	3.9	12.0	3.8	16.901	3.949	0
	최저	942	0.9	5.2	1.0	5.141	0.800	0
1월	평균	1,281	1.9	7.8	1.8	7.714	1.335	<30
	최고	2,132	2.2	9.7	2.8	8.434	1.414	<30
	최저	1,058	1.6	6.2	1.2	6.949	1.249	<30
2월	평균	1,215	2.1	8.1	2.0	8.003	1.361	<30
	최고	1,962	2.5	9.1	3.0	8.769	1.450	<30
	최저	990	1.6	6.0	1.4	6.566	1.288	<30
3월	평균	1,398	1.6	7.7	1.9	7.946	1.379	<30
	최고	2,998	2.8	9.0	2.6	9.296	1.511	<30
	최저	984	1.0	6.2	1.0	6.901	1.243	<30
4월	평균	1,261	1.8	7.5	2.0	8.005	1.385	<30
	최고	2,212	2.5	8.6	2.6	8.961	1.538	<30
	최저	945	1.4	6.0	1.4	6.614	1.252	<30
5월	평균	1,311	1.9	7.7	2.3	7.983	1.725	<30
	최고	2,025	3.1	12.0	3.8	8.673	1.997	<30
	최저	1,091	0.9	6.5	1.0	7.189	1.300	<30
6월	평균	1,497	1.9	7.5	2.1	8.325	1.544	<30
	최고	2,464	3.9	10.0	2.8	8.817	1.688	<30
	최저	1,203	1.3	6.6	1.2	7.811	1.339	<30
7월	평균	1,844	2.0	8.4	2.4	8.454	1.922	<30
	최고	3,298	2.8	9.5	3.4	10.036	2.277	<30
	최저	1,277	1.3	5.7	1.2	5.141	1.270	<30
8월	평균	1,800	2.5	8.0	2.9	8.103	1.849	<30
	최고	2,835	3.1	9.7	3.8	9.291	2.148	<30
	최저	1,253	1.2	6.1	2.2	6.631	1.402	<30
9월	평균	1,969	2.0	7.4	2.0	7.315	1.483	<30
	최고	3,726	2.5	8.7	3.0	8.972	3.949	<30
	최저	1,336	1.4	6.0	1.4	5.300	0.800	<30
10월	평균	1,369	1.9	6.7	2.2	11.681	1.987	<30
	최고	2,728	2.8	9.4	3.0	16.901	2.172	<30
	최저	1,018	1.2	5.3	1.6	8.067	1.674	<30
11월	평균	1,228	2.1	6.2	2.5	12.729	1.979	<30
	최고	1,602	2.9	7.7	3.0	15.464	2.343	<30
	최저	942	1.4	5.2	1.6	11.260	1.779	<30
12월	평균	1,462	2.0	6.8	2.2	13.282	1.684	<30
	최고	2,198	2.9	9.2	3.2	15.145	1.957	<30
	최저	1,068	1.4	5.2	1.6	11.260	1.435	<30

○ 2008년(제주하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	100,836	7.4	10.5	7.4	15.935	1.444	177
	최고	129,505	9.8	14.4	13.6	27.252	2.345	700
	최저	80,571	3.4	6.7	3.6	6.483	0.355	30
1월	평균	92,637	8.6	12.0	9.0	20.153	1.755	139
	최고	118,300	9.8	14.4	13.6	27.252	2.336	700
	최저	85,290	6.0	8.2	7.1	15.215	0.518	30
2월	평균	91,297	8.5	10.6	8.5	19.584	1.962	150
	최고	116,383	9.3	13.0	9.8	22.095	2.345	350
	최저	80,902	6.9	8.3	6.4	14.848	1.627	30
3월	평균	96,924	8.2	10.3	8.0	17.803	1.652	120
	최고	113,577	9.4	14.2	9.3	21.333	2.145	320
	최저	89,268	6.9	7.6	6.0	14.240	1.249	30
4월	평균	91,368	8.2	10.7	8.0	17.224	1.569	152
	최고	113,962	9.4	13.0	9.6	18.868	1.903	450
	최저	80,571	6.7	8.0	6.8	14.390	0.924	30
5월	평균	95,035	7.6	10.9	7.4	16.407	1.488	145
	최고	118,270	8.8	13.2	9.0	18.550	1.845	350
	최저	88,224	5.4	8.4	4.4	12.204	0.857	30
6월	평균	103,833	7.2	9.6	7.3	14.751	1.270	221
	최고	124,160	9.2	13.3	9.4	18.726	1.794	450
	최저	86,480	3.5	6.8	4.8	6.483	0.355	30
7월	평균	113,321	6.2	10.7	6.2	13.428	1.328	196
	최고	121,923	8.4	14.2	8.2	17.772	1.867	470
	최저	100,300	3.4	6.7	4.0	8.643	0.549	30
8월	평균	114,185	6.5	10.3	6.0	12.261	1.019	250
	최고	129,505	8.8	13.2	8.0	16.454	1.447	420
	최저	106,127	4.8	8.0	3.6	9.185	0.446	110
9월	평균	108,926	5.9	9.8	5.9	11.802	0.947	217
	최고	117,035	7.4	12.5	7.4	13.931	1.225	400
	최저	102,340	4.3	8.3	4.7	9.463	0.574	30

○ 2008년(동부하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	2,458	5.5	8.9	4.7	10.710	1.493	30
	최고	8,760	10.7	19.4	17.2	19.900	1.900	30
	최저	1,163	1.4	1.6	0.8	2.300	0.500	0
1월	평균	2,361	4.5	6.6	3.3	9.400	1.000	<30
	최고	8,760	7.0	8.4	8.2	11.600	1.400	<30
	최저	1,368	2.4	4.4	0.8	3.500	0.600	<30
2월	평균	1,795	5.1	7.4	2.7	10.300	1.600	<30
	최고	4,612	8.0	15.4	8.8	13.000	1.800	<30
	최저	1,177	3.2	5.2	0.8	5.800	1.100	<30
3월	평균	1,980	4.6	10.3	3.1	10.000	1.400	<30
	최고	4,518	7.7	16.2	6.4	12.100	1.800	<30
	최저	1,435	2.5	5.5	1.0	5.100	0.900	<30
4월	평균	2,090	6.9	10.8	4.8	9.600	1.700	<30
	최고	4,313.0	10.7	17.8	8.800	19.900	1.900	<30
	최저	1,414	3.2	1.6	1.2	2.500	1.000	<30
5월	평균	2,045	6.1	13.0	5.2	11.600	1.700	<30
	최고	5,888	8.6	19.4	9.0	19.200	1.900	<30
	최저	1,163	3.0	7.0	1.6	3.300	1.000	<30
6월	평균	2,702	5.2	8.6	4.7	11.700	1.400	<30
	최고	6,707	7.7	16.0	8.6	17.100	1.800	<30
	최저	1,315	1.4	6.0	0.8	2.300	0.500	<30
7월	평균	2,894	6.1	9.9	6.8	12.103	1.266	<30
	최고	4,625	8.7	16.4	8.6	18.788	1.625	<30
	최저	2,370	3.4	3.2	1.6	6.540	0.751	<30
8월	평균	3,255	5.8	7.7	5.9	11.694	1.575	<30
	최고	6,228	8.9	13.6	9.2	17.821	1.844	<30
	최저	1,700	3.5	5.4	2.8	9.529	1.344	<30
9월	평균	3,001	5.1	6.2	5.7	9.997	1.792	<30
	최고	6,782	8.9	16.6	17.2	17.589	1.827	<30
	최저	2,245	2.1	2.0	1.0	2.800	0.989	<30

○ 2008년(서부하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	2,681	3.7	3.3	4.4	10.011	1.562	＜ 30
	최고	5,856	9.8	11.8	9.4	17.892	1.998	＜ 30
	최저	77	0.9	1.0	0.8	3.576	0.549	＜ 30
1월	평균	2,625	5.0	6.8	4.7	11.489	1.360	＜ 30
	최고	4,630	7.6	9.6	6.6	17.820	1.842	＜ 30
	최저	976	2.3	4.3	2.6	7.431	0.549	＜ 30
2월	평균	2,374	3.0	5.8	4.3	12.290	1.508	＜ 30
	최고	2,740	5.8	9.9	9.0	16.668	1.863	＜ 30
	최저	1,968	0.9	1.2	2.2	6.636	1.140	＜ 30
3월	평균	2,411	1.9	2.4	2.5	13.157	1.396	＜ 30
	최고	4,252	3.7	3.6	6.6	17.400	1.845	＜ 30
	최저	938	1.2	1.0	1.0	10.368	1.035	＜ 30
4월	평균	2,463	2.3	21.0	3.4	11.764	1.704	＜ 30
	최고	4,270	3.7	3.6	7.8	17.892	1.980	＜ 30
	최저	1,051	1.0	1.3	0.8	5.844	1.308	＜ 30
5월	평균	2,589	3.4	2.9	4.7	11.161	1.833	＜ 30
	최고	5,172	8.4	6.6	8.6	13.542	1.995	＜ 30
	최저	1,044	1.7	1.8	2.8	9.320	1.296	＜ 30
6월	평균	3,007	3.4	3.1	4.3	7.661	1.437	＜ 30
	최고	4,912	8.5	11.8	8.4	13.737	1.998	＜ 30
	최저	2,337	1.2	1.0	2.2	3.634	0.820	＜ 30
7월	평균	2,709	4.7	1.9	4.7	6.259	1.558	＜ 30
	최고	3,841	9.8	2.7	8.4	8.472	1.962	＜ 30
	최저	1,305	1.9	1.4	3.0	3.596	1.182	＜ 30
8월	평균	3,319	5.4	2.0	5.4	6.537	1.503	＜ 30
	최고	5,856	7.8	3.1	7.4	8.688	1.848	＜ 30
	최저	77	3.1	1.4	3.4	5.184	1.203	＜ 30
9월	평균	2,527	4.2	2.5	5.5	9.901	1.731	＜ 30
	최고	4,535	7.4	3.5	9.4	13.920	1.986	＜ 30
	최저	1,162	2.6	2.0	2.8	6.432	1.131	＜ 30

○ 2008년(보목하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	12,352	7.8	9.3	6.5	13.128	0.923	94
	최고	21,420	9.2	17.6	8.9	18.683	4.000	180
	최저	9,694	3.7	5.5	3.3	7.482	0.167	61
1월	평균	12,591	8.1	8.7	5.9	11.829	1.028	86
	최고	16,449	8.8	9.9	7.8	14.973	4.000	120
	최저	10,526	7.4	6.2	4.7	9.017	0.451	61
2월	평균	11,934	8.3	8.4	5.8	12.102	1.203	91
	최고	16,129	8.9	9.9	6.9	17.838	1.466	120
	최저	10,200	7.5	5.8	3.9	9.086	0.810	62
3월	평균	11,541	8.4	8.3	6.7	13.420	0.926	87
	최고	17,556	9.1	9.5	8.9	18.402	1.423	120
	최저	9,953	7.3	6.2	4.6	9.184	0.167	62
4월	평균	11,786	8.5	8.7	8.1	15.714	1.040	87
	최고	16,212	9.1	9.6	8.7	18.015	1.479	120
	최저	10,485	6.3	6.4	6.6	11.524	0.353	63
5월	평균	11,833	8.3	8.9	7.6	12.588	0.720	90
	최고	16,063	9.2	9.7	8.4	18.683	1.247	120
	최저	10,588	7.3	8.2	5.7	9.607	0.187	61
6월	평균	13,327	6.8	8.1	6.0	11.695	0.772	90
	최고	20,125	8.8	9.5	7.2	13.607	1.524	120
	최저	10,470	4.5	5.5	3.4	8.424	0.188	62
7월	평균	13,105	7.4	8.8	5.3	11.510	0.652	91
	최고	18,041	8.6	12.9	6.7	13.928	1.469	120
	최저	12,092	3.7	6.9	3.3	7.482	0.237	61
8월	평균	12,713	7.2	12.4	6.2	14.062	1.087	114
	최고	21,420	9.0	14.7	8.7	17.510	1.662	180
	최저	9,861	5.2	9.9	4.8	10.632	0.668	78
9월	평균	12,335	7.5	11.8	6.6	15.234	0.882	112
	최고	19,274	8.6	17.6	8.1	17.769	1.657	150
	최저	9,694	6.1	8.1	4.6	10.121	0.445	72

○ 2008년(색달하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	6,570	8.6	12.4	7.6	13.434	1.484	202
	최고	8,339	9.2	15.1	8.8	16.343	1.799	353
	최저	5,166	7.2	9.6	5.8	10.465	1.104	126
1월	평균	6,709	7.6	9.4	7.5	14.601	1.262	236
	최고	7,842	8.4	10.7	8.2	17.048	1.401	272
	최저	5,089	6.8	8.1	6.8	12.154	1.123	200
2월	평균	4,319	9.5	13.9	7.9	14.889	1.555	190
	최고	8,256	9.6	14.4	8.4	16.784	1.605	230
	최저	2,611	9.3	13.3	7.4	12.994	1.505	150
3월	평균	6,157	8.7	11.5	7.9	14.361	1.313	215
	최고	7,712	9.9	16.6	8.2	14.664	1.934	301
	최저	5,191	7.8	9.9	5.6	13.792	0.569	120
4월	평균	6,464	8.4	13.6	8.4	15.174	1.469	214
	최고	8,267	7.8	16.6	9.2	15.624	1.785	270
	최저	5,740	6.3	10.0	7.8	14.760	1.302	200
5월	평균	6,737	8.7	13.5	7.7	14.565	1.520	173
	최고	7,559	9.3	17.3	9.8	19.751	1.999	300
	최저	4,796	6.9	9.6	4.8	8.169	1.028	110
6월	평균	7,241	8.7	13.4	7.3	13.663	1.686	174
	최고	8,888	9.6	16.1	8.8	19.458	1.999	310
	최저	5,751	4.8	5.6	4.2	5.990	1.002	90
7월	평균	7,482	8.6	13.2	7.2	13.758	1.676	171
	최고	8,927	9.9	16.1	9.8	18.351	1.783	700
	최저	6,192	7.2	10.2	4.8	13.769	1.033	40
8월	평균	7,601	8.7	12.2	7.2	12.127	1.359	252
	최고	8,460	9.6	17.6	9.8	19.280	1.894	590
	최저	5,893	7.5	9.1	3.2	6.435	0.583	30
9월	평균	6,423	8.6	10.8	7.6	7.773	1.514	194
	최고	9,142	8.4	10.6	7.4	6.126	1.794	210
	최저	5,227	8.4	10.6	7.4	6.126	1.794	200

○ 2008년(대정하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	3,682	3.2	5.9	6.3	10.190	0.881	89
	최고	9,021	8.1	14.9	15.0	16.176	1.536	412
	최저	1,337	1.2	3.6	2.0	7.143	0.434	51
1월	평균	3,809	3.5	6.2	6.8	13.533	1.160	90
	최고	4,965	8.1	14.9	15.0	16.176	1.536	412
	최저	2,932	2.6	4.3	2.0	9.253	0.871	58
2월	평균	3,815	2.1	4.2	5.3	11.080	1.041	71
	최고	4,314	4.0	5.0	8.0	14.314	1.373	86
	최저	3,290	1.8	3.6	2.0	7.614	0.853	59
3월	평균	3,680	2.7	5.0	5.3	9.384	0.937	72
	최고	5,719	6.4	8.4	10.0	10.990	0.998	100
	최저	3,148	1.2	3.9	2.0	8.880	0.590	51
4월	평균	3,911	2.9	5.5	6.6	9.556	0.849	73
	최고	6,988	6.8	8.7	10.0	11.127	1.001	113
	최저	3,392	1.7	4.6	4.5	8.919	0.598	60
5월	평균	4,426	3.3	6.1	6.2	9.172	0.862	86
	최고	9,021	8.1	11.6	9.0	10.965	0.969	248
	최저	3,508	2.1	4.9	3.0	8.620	0.590	62
6월	평균	5,852	3.9	6.8	7.2	8.916	0.717	94
	최고	8,462	6.6	9.6	10.0	10.329	0.903	136
	최저	4,626	2.2	5.0	3.5	7.143	0.558	57
7월	평균	5,655	3.5	6.7	6.2	9.969	0.754	94
	최고	8,506	6.7	10.3	8.5	11.776	0.973	125
	최저	4,608	1.9	4.3	5.0	7.293	0.434	74
8월	평균	5,050	2.7	5.8	5.9	10.428	0.845	104
	최고	7,806	5.0	8.7	8.5	11.509	0.974	134
	최저	1,337	1.9	4.2	3.5	7.904	0.591	59
9월	평균	5,055	3.6	6.6	7.1	9.676	0.767	112
	최고	6,983	6.3	9.6	9.5	11.106	0.903	137
	최저	4,327	2.1	4.7	3.0	7.545	0.602	88

○ 2008년(성산하수처리장)

월별	구분	유입수량 (톤/일)	방류수질(mg/l, 개/㎖)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
연간	평균	1,784	1.8	6.9	2.1	9.928	1.711	<30
	최고	3,351	7.6	12.6	4.4	17.071	1.994	<30
	최저	1,108	0.3	4.6	0.4	6.016	0.978	<30
1월	평균	1,614	1.5	6.4	1.5	14.556	1.388	<30
	최고	2,928	2.4	9.2	1.8	17.071	1.666	<30
	최저	1,108	0.6	5.4	0.8	12.059	0.978	<30
2월	평균	1,468	1.8	6.7	1.7	11.255	1.482	<30
	최고	2,585	2.4	7.5	2.2	15.422	1.808	<30
	최저	1,290	1.4	5.7	1.2	9.063	1.237	<30
3월	평균	1,560	1.7	6.6	1.9	9.973	1.836	<30
	최고	3,024	2.2	7.2	2.4	11.031	1.949	<30
	최저	1,140	1.3	5.1	1.6	8.452	1.609	<30
4월	평균	1,499	1.7	6.9	1.7	8.616	1.708	<30
	최고	2,579	2.3	7.7	2.4	11.590	1.994	<30
	최저	1,127	1.0	6.0	1.4	7.269	1.435	<30
5월	평균	1,640	1.8	7.1	1.9	7.193	1.854	<30
	최고	2,432	2.7	7.7	2.6	8.067	1.978	<30
	최저	1,283	1.2	6.0	1.6	6.016	1.648	<30
6월	평균	1,983	2.2	7.0	2.4	7.285	1.692	<30
	최고	3,038	2.5	7.7	3.4	8.642	1.877	<30
	최저	1,438	1.6	5.6	1.8	6.577	1.407	<30
7월	평균	2,106	2.1	6.9	2.3	9.813	1.761	<30
	최고	2,861	2.6	12.6	3.2	11.527	1.893	<30
	최저	1,572	1.6	4.6	1.2	7.879	1.634	<30
8월	평균	2,323	2.2	7.2	2.5	9.670	1.790	<30
	최고	3,351	7.6	8.5	4.2	14.053	1.973	<30
	최저	1,364	0.8	5.5	1.2	6.655	1.359	<30
9월	평균	1,833	1.4	7.2	2.6	11.033	1.874	<30
	최고	2,966	4.5	9.9	4.4	14.495	1.975	<30
	최저	1,420	0.3	5.2	0.4	7.910	1.664	<30

59. 농어촌 마을하수도 운영관리 용역 추진상황

❍ 숙련된 하수도 기술자 및 장비가 확보된 민간업체에 운영관리

용역을 함으로서 체계적인 마을하수도 방류수질관리 및 관리인력

감축을 통한 유지관리비 절감

※ 사업시행 근거 : 소규모 하수도사업 통합지침(환경부,농림부)

ꏅ 용역개요

❍ 제주시지역

□ 운영관리 대상시설물 : 농어촌 마을하수도 27개소

- 소규모 하수도 15개소, 간이오수처리시설 12개소

□ 운영관리비용 : 107,376천원(지방비 107,376천원)

□ 운영관리 용역기간 : 2008. 03. 24 ～ 2009. 03. 24(12개월간)

□ 용역업체(경쟁입찰) : 제주시 소재 제주환경개발(주) 강경수

❍ 서귀포시 지역

□ 운영관리 대상시설물 : 농어촌 마을하수도 28개소

- 소규모 하수도 16개소, 간이오수처리시설 12개소

□ 운영관리비용 : 63,976천원(지방비 63,976천원)

□ 운영관리 용역기간 : 2008. 04. 04 ～ 2009. 04. 04(12개월간)

□ 용역업체(경쟁입찰) : 제주시 소재 동현환경(주) 부경용

ꏅ 추진상황

❍ 농어촌마을하수도 운영관리용역 착수 : 제주시(3.24), 서귀포시(4.4)

❍ 매주, 매월단위로 운영관리실태 전반에 대한 정상가동 여부 및   방류수 수질관리

ꏅ 기대효과

❍ 완벽한 하수처리로 중산간 지역 지하수 오염방지 및 쾌적한 농어촌 생활환경 조성

60. 하수도정비 기본계획수립 추진상황

ꏅ 관련근거

❍ 하수도법 제6조 규정에 의하여 하수도정비 기본계획을 20년 단위로 수립하고 5년마다 변경계획을 수립

ꏅ 용역 개요

❍ 용역명 : 제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획 수립용역

❍ 용 역 비 : 1,220백만원(하수도사업 특별회계)

❍ 용역기간 : ‘07. 8. 9 ~’09. 2. 12( 18개월)

❍ 과업내용

□ 2025년 목표의 장기적인 하수도시설의 정비계획 마련

□ 비효율적인 하수처리구역 조정 및 하수처리장 증설계획 반영

□ 농공단지, 위생처리장등 환경기초시설의 연계처리방안 마련

□ 도 전역에 대한 도시 및 마을하수도정비 기본계획 수립

□ 하수종말처리장 방류수 재이용에 대한 타당성 조사

□ 광역 도시기본계획과 연계한  2025년까지의 장기 하수도 비전 제시

ꏅ 추진 상황(계획)

❍ ‘07년  8월 : 용역 착수

❍ ‘07. 8 ~ ’08. 12월 : 기본계획 수립 주요내용

□ 기존 시․군 경계지역 하수처리구역 재조정 및 취락지역 추가 지정

□ 환경기초시설의 하수처리장 연계처리계획 마련

□ 하수처리장 증설 및 농어촌마을하수도 폐쇄 계획안 마련

□ 녹지지역내 하수처리구역 지정관련 협의(관계부서) 시행

□ 영어교육도시조성등 대규모 개발사업 하수처리계획 반영

ꏅ 향후계획

❍ ‘08년 12월 : 통합하수도정비 기본계획(안) 확정

❍ ‘09년 1월 : 통합하수도정비 기본계획(안) 승인신청(환경부)

61. 위생처리장 관리 운영 민간위탁 현황

처리장명		제주위생처리장	동부위생처리장	서부위생처리장
소재지		제주시 도두2동 1125	조천읍 선흘리 4137	한림읍 금악리 544
설치년도		1989	1990(최초) 1996(증설)	1996(최초) 1999(증설)
설치비(천원)		2,436,000 (국비 1,241,000 시비 1,195,000)	2,237,000 (국비 1,449,000 군비 738,000)	2,740,000 (국비 1,428,000 군비 1,312,000)
처리공법		1차처리후 제주하수처리장 연계처리	액상부식법	액상부식법
일일처리용량		600㎘/일	40㎘/일	40㎘/일
수탁업체		(주)경원산업	(주)경원산업	(주)경원산업
위탁기간 (최초 위탁일)		‘08. 3. 1 - ’10. 12. 31 (2000.3.1)	‘07. 1. 1 - ’09. 12. 31 (1999.1.1)	‘07. 1. 1 - ’09. 12. 31 (1999.1.1)
연 도 별 위 탁 금 (천원)	2006년	350,000	547,907
	2007년	358,180	640,000
	2008년 (계약액)	310,900 (‘08.3.1~12.31)	679,000
연 도 별 처 리 량 (㎘)	2006년	204,086	8,701	10,491
	2007년	205,745	8,979	10,747
	2008년 9월	158,284	6,724	7,801