2009.  4. 13

제259회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

제주특별자치도개발공사

먹는샘물 제2공장 건설 계획(안)

먹는샘물 제2공장 건설 계획(안)

➢ 제주물산업이 정부「5+2광역경제권」선도사업으로 선정됨에 따라

물산업을 제주를 대표하는 新성장동력 산업으로 육성하기 위한

제주물산업 클러스터 조성계획에 맞춰

➢ 먹는샘물 제2공장 건설계획을 수립, 지역경제 고부가가치 창출

및 제주물의 세계적 브랜드 진출을 통한 제주물산업 1조원

매출 기반을 마련하고자 함.

❏ 사업개요

❍ 건    명 : 먹는샘물 제2공장 건설

❍ 위    치 : 서귀포시 도순동 산 79번지 (제주워터클러스터 산업단지내)

❍ 면    적 : 420천㎡중 약 76천㎡ (23천평)

❍ 생산능력 : 40만톤/년

❍ 사업기간 : 2009. 5 ~ 2011. 3

❍ 사 업 비 : 44,300백만원

❏ 사업내용

❍ 기반 시설공사 및 건축공사 - 부지정지 및 포장, 공장 및 관리용 건물, 조경시설 등

❍ 기계설비 및 전기통신공사 - 아셉틱설비, 제병, 충진, 유틸리티 설비 등

❍ 기타 실시설계용역 및 감리 등

❏ 재원 확보방안

(단위 : 백만원)

계	차 입 (LG생활건강)	공사부담	비 고
44,300	30,000	14,300

※ 차입금 상환 : 2년거치 3년 분할상환 (무이자)

❏ 수익성 추정

(단위 : 백만원)

구 분	금 액	비 고
매 출 액	99,000	40만톤 판매 기준 (2.0ℓ 30만톤 / 0.5ℓ 10만톤)
매출원가	53,370
매출총이익	45,630
판매관리비	20,223	매출액대비 20% 적용
영업이익	25,407
당기순이익	19,310	수익률 19.5% 수준 (최저수준 검토)

* 2008년 삼다수 판매단가 및 매출원가를 적용하여 추정함.

❏ 향후 추진계획

❍ ’09. 4. 13 : 공장건설계획 도의회 보고

❍ ’09. 04월 : 실시설계 용역비 추경예산 확보

❍ ’09. 11월 : 실시설계 용역 완료 (용역기간 : 6개월)

❍ ’09. 12월 : 공장 건설예산 확보

❍ ’10. 02월 : 공사 발주

❍ ’10. 03월 : 공사 계약 및 착공 (산업단지조성공사와 병행 추진)

❍ ’11. 03월 : 공사 준공 (공사기간 : 12개월)

❏ 기대효과

❍ 제주물의 부가가치 극대화를 통한 제주자치도 자주재원 마련

❍ 산남지역 건설에 따른 지역 균형발전 도모

- 물류 서귀포항 이용 등 서귀포지역 경제활성화 기대

❍ 제주물 세계적 브랜드화 추진에 따른「청정 국제자유도시 제주」세계 홍보

❍ 고용창출 효과 - 200명 예상

[공장건설 예정 위치도]

보전지역

(11,350㎡)

공장지역

(76,000㎡)

타 사업부지

제2산록도로