제262회 제주특별자치도의회 정례회

농수축·지식산업위원회

2009. 7. 21(화). 11:00

현 안 사 항  보 고

【도 - 한국가스공사, 제주 소형 LNG기지 입지선정 업무협약 체결】

지 식 경 제 국

제주 소형 LNG기지 입지선정에 따른

도 - 한국가스공사 업무협약 체결

	LNG기지 건설개요
□ 사업주체 : 한국가스공사 □ 사업기간 : ‘09년～’15년(한국가스공사 용역자료) □ 위 치 : 애월항(부지 59,572㎡) □ 사 업 비 : 2,193억원(항만개발 1,028 인수기지 건설 1,165) □ 사업내용 : 저장탱크 2기, 접안설비, 기화송출설비, 행정동 등

지금까지 주요 추진상황

□ ‘08. 12월 제주지역 LNG기지 입지조사 연구용역 완료(한국가스공사)

- 후보지역 : 제주외항, 한림항, 애월항(최적후보지 : 제주외항)

□ ‘09. 3. 11 애월지역 주민 LNG기지 유치 건의

□ ‘09. 3. 13 TF팀 회의개최, 애월항을 LNG기지 최우선지역으로 선정

□ ‘09. 3. 30 애월항내 LNG기지 건설요청(도→한국가스공사)

□ ‘09. 7. 2 애월항내 LNG기지 안전성 검토용역 완료

제주 소형 LNG기지 입지선정을 위한 업무협약 체결 요청(한국가스공사→도)

□ ‘09. 7. 15 제주 소형 LNG기지 입지선정 업무협약서 문안 협의완료

향후 추진계획

□ LNG기지 건설부지 확정 발표 : ‘09. 7. 21  10:00

□ 인수기지 건설부지 지역주민과의 협의 추진(설명회개최 등) : ‘09 하반기

□ 애월항 기본계획 변경 추진 : ‘09 하반기

□ 예비타당성 조사 시행(기획재정부) 및 국비확보 추진 : '10 상반기

□ 어업피해 보상 및 항만개발 시행, LNG기지 인․허가 행정절차 지원  : '10 하반기 이후

	【협약서(안) 주요내용】
□ 건설주체 및 투자비 - 제주도는 애월항의 신규 방파제 및 방파호안을 건설하되 건설비용(어업보상 포함)은 제주도가 국비를 확보하여 부담 - 가스공사는 애월항에 소형 LNG기지 건설 및 부지 매립공사를 가스공사의 비용으로 추진 □ 안전성 확보 - 제주도는 방파호안 건설시 한국해양연구원에서 수행한 “애월항 내 LNG기지 안전성 검토 보고서”를 참조하여 태풍 등 황천시 월파가 허용되지 않는 구조 및 규모로 건설 - LNG기지 연접부두에 가연성 위험물 취급 또는 설치를 허가하지 않으며, LNG선박 하역시 LNG기지 연접 부두에 타선박의 접안 및 하역은 가스공사와 협의 【애월항내 LNG기지 안전성 검토 용역결과】 ▪ 적정한 방파제의 마루높이, 적정 부지고 등 안전성 확보방안이 마련된다면 파랑, 월파, 침수 등의 피해는 없을 것으로 판단결론 □ 공급시기 - 제주도내 천연가스 공급시기는 신규 방파제 건설 완료 후 3년 이내로 하되, 가스공사는 가급적 조기에 천연가스를 공급하도록 노력 □ 방파제 건설예산 미확보시 - 애월항 기본계획 변경의 정부 미승인 또는 제주도에서 애월항 2단계개발 사업비 전액 확보가 곤란할 경우 가스공사는 정부 및 제주도와 협의하여 새로운 천연가스 공급방안을 검토하여 추진