2007. 2. 5

의회청사 정비 계획(안)

제주특별자치도의회사무처

의회 청사 정비 계획

의정활동의 원활한 추진을 위하여 제주지방조달청 청사를  매입․정비하여 의정환경 개선

❏ 청 사 현 황

구 분	의 회 청 사 (1991년도 건축)	조 달 청 사 (1981년도 건축)
부 지	4958.6㎡(1,500평)	6,274.7㎡(1,898평)
건 물	4,867.35㎡(1,472평)	1,865㎡(564평)
구 조	지하 1층, 지상 4층	지하 1층, 지상 3층

❏ 지금까지 추진상황

❍ ‘06. 2.  의회청사 확보계획 확정

- 행정자치부 정부제주지방합동청사 신축계획에 의거 제주지방조달청사 확보계획 수립

❍ '06. 8. 30. 의원실 등 3개소 분산 배치

❍ ‘06. 12.  ’07년도 국유재산관리계획서 제출(조달청→재정경제부)

❍ ‘07. 1.~ 2. 국유재산관리계획 심의 절차 이행 중(재정경제부 : 국무회의 심의)

❏ 향후 추진 계획

❍ ‘07. 3. 의회별관 매입

❍ ‘07. 3. ~4. 의회 청사 정비공사 및 별관 개축공사 기본실시설계

❍ ‘07. 5. ~ ’07. 9. 청사 정비 및 개축공사

❏ 청사 정비 계획

❍ 사업기간 : 2007. 2. ～ 2007. 9.

❍ 예산확보 : 60억원(‘07 본 예산)

∙제주지방조달청사 매입 : 50억원

∙정비 공사 : 10억원

❍ 사업 내용

∙의회청사 : 회의실․사무실 정비

∙조달청사 : 증․개축 또는 신축 (의원실 및 사무실 등)

❍ 조달청사 신․개축 공사 비교

구 분	증․개축	신 축
면 적	2,484㎡(751평)	5,950㎡(1,800평)
구 조	지하 1층, 지상4층	지하1층, 지상 5층
사업비	25억원	90억원
공사기간	5개월	12개월
주요시설	의원실 등	의장실, 부의장실, 본회의장, 상임위원장실, 상임위원회의실, 전문위원실

※ 참고자료 (1),(2)

❏ 장․단점

구분	증․개 축	신 축
장점	∙공사비 저렴 ∙공사기간 단기소요	∙본회의장 등 충분한 공간 확보
단점	∙건물 노후(26년) ∙본회의장 협소 등 충분한 공간 확보 미흡	∙공사비 과다소요(90억원)로 추가 예산 확보 어려움 ∙도민의 부정적 여론 우려 ∙미래 상황변화에 대처 곤란

❏ 추진계획(안)

∙조달청사 증․개축

	《협의사항》
조달청사 증․개축 또는 신축 여부 협의

참고자료 (1)

❏ 제주지방조달청 건물 구조

❍ 본 건물은 ‘81년 건축한 창고형 건축물로서

❍ 전체 건물의 외형은 3개층이나 내부구조는 전체면적의 70%가 창고로서 2층으로 되어 있음

❏ 증․개축이 불가피한 사유

❍ 본 건물을 개축하여 의원실(30실)을 시설하기 위해서는 건물의 전면부분 확장(4m)과 1개층을 증축하여야 함

❍ 개축 면적 : 1,344㎡(406.5평)

❍ 증축면적 : 1,140㎡(344.7평)

- 확장 : 384㎡(116.1평)=(30m×4m×2개층)+(12m×4m×3개층)

- 증축 : 756㎡(228.6평)=(42m×18m×1개층)

❏ 공사비 산출내역

❍ 증․개축시 25억원

∙개    축 406평,  8억원(평당 2,000천원)

∙확장․증축  344평, 17억원(평당 5,000천원)

❍ 신축시 90억원

∙건평 1,800평×평당 공사비 5,000천원

※ ‘07 본예산 개축비 10억원은 기존건물(564평) 그대로 개축하는 것으로 산출한 것임

참고자료 (2)

【 제1안 】- 증 ․ 개축 (기존 배치 중심)

의회 청사
1층	- 대회의실(운영위,예결위 회의실 겸용) - 사무처장실, 전문위원실(3실) - 도민의 방, 여직원실, 기사대기실
2층	- 의장실, 부의장실(2실) 상임위원장실(6실) - 기자실, 통신실
3층	- 상임위원장실(2실) - 상임위원회 회의실(4실) - 집행부 대기실, 전산실
4층	- 상임위원회 회의실(2실) - 전문위원실(4실)
지하층	- 자료실(확장)
조달 청사
1~4층	- 총무담당관실, 의사담당관실, 입법정책관실 등
1~3층	- 의원실 30실(층당 10실)

【 제2안 】- 증 ․ 개축 (회의실+상임위원장실+전문위원실)

의회 청사
1층	- 대회의실(중,소 회의실 겸용) - 사무처장실 - 도민의 방, 여직원실, 기사대기실
2층	- 의장실, 부의장실(2실) 상임위원장실(운영위, 예결위) - 1개 상임위원회 - 기자실, 통신실
3층	- 3개 상임위원회 (1실은 전문위원실 별도) - 집행부 대기실
4층	- 2개 상임위원회 - 전문위원실(2실)
지하층	- 자료실(확장)
조달 청사
1~4층	- 총무담당관실, 의사담당관실, 입법정책관실 등
1~3층	- 의원실 30실(층당 10실)

※ 의회 본관 상임위원회는 회의실, 위원장실, 전문위원실 연계 배치

【 제3안 】 - 신 축

의회 청사
1층	- 도민의 방, 의회 도서관 - 사무처장실, 총무담당관실
2층	- 의원실(20실)
3층	- 대회의실, 의원실(10실)
4층	- 의사담당관실, 입법정책관실
조달 청사
1~2층	- 본회의장 - 의장실, 부의장실(2실), 집행부 대기실, 기자실
3층	- 상임위원장실(운영위, 예결위) - 소회의실
4층	- 3개 상임위원회(상임위원장실+회의실+전문위원실)
5층	- 3개 상임위원회(상임위원장실+회의실+전문위원실), 전문위원실(1실)