태풍“나리”피해 현황 및 복구계획

재해개요

1. 재해원인 : 제11호 태풍 나리(NARI)

2. 재해기간 : 2007. 9. 16 05:00 ～ 18:00

3. 재해지역 : 도내 전지역

4. 강우량 : 제주시 지역 420mm, 서귀포시 지역 265.5mm

5. 순간최대풍속 :  39m/s(중심기압 992hpa)

피해상황

1. 인명피해 : “없음”

2. 시설피해

가. 피해교육기관

◦ 학교 77교(초38교, 중19교, 고20교), 직속기관 3개

나. 피해금액 : 4,829,681천원

다. 주요피해시설

◦ 교  실 16개교 (초7교, 중4교, 고5교) - 2,043,510천원

◦ 체육관 12개교 (초2교 ,중4교, 고6교) -  666,522천원

◦ 울타리 23개교 (초9교, 중7교, 고7교) -  195,206천원

◦ 급식소 13개교 (초2교, 중9교, 고2교) -   98,047천원

◦ 기자재 10개교 (초4교, 중2교, 고4교) - 1,053,433천원

◦ 기  타                             -  772,963천원

라. 세부피해내역 : 붙임“학교별 피해현황 및 복구소요액 참조”

복구현황

1. 학교 수업 및 급식에 필요한 시설을 우선적으로 복구하기 위하여 예비비(1,047,620천원) 및 시설비(집행잔액 567,000천원) 등 총 1,614,620천원을 조기에 투입하여, 피해가 비교적 큰 학교(초 10교, 중 4교, 고 3교)에 대하여 우선 복구 추진

2. 학교별 복구 현황

피해기관		복 구 현 황				비 고
		복구완료	공사중	계약중 또는 발주준비중	복구비 확정후 공사 예정
학교	77	18	16	12	31
기관	3	1			2

※ 소규모 피해 중 긴급보수를 요하는 시설피해에 대해서는 학교 자체에서 복구

3. 복구비 신청

가. 교육시설재난공제회

구 분	제주시교육청	서귀포시 교육청	도교육청	계
신청 학교수	27교	14교	17교(기관포함)	58교
신 청 금 액	1,549,209천원	69,570천원	798,339천원	2,417,118천원

- 사립학교 : 6교(오현고는 현재 복구비 산정중에 있어 미포함)

- 사립학교 복구비 신청액 :  438,526천원

※ 오현중ㆍ고등학교 급식소 및 급식기자재 피해 자체 복구 완료(현재 정상적인 급식 실시)

나. 교육인적자원부 특별교부금 (기자재 포함)

- 대상학교 : 80교(직속기관 포함)

- 신청액 : 1,849,832천원

향후 추진계획

□ 현재까지 긴급 복구 노력으로 피해 학교들은 모두 정상적인 학교수업, 급식이 이루어지고 있음. 다만, 피해규모가 큰 체육관, 교실 등은 현재 예비비를 긴급 투입하여 조기공사에 착수하였으나 향후 완전복구까지는 다소 시일이 소요될 것으로 보임 ⇒ 내년 2월까지 완료 노력

□ 복구비가 결정된 학교에 대해서는 즉시 학교로 복구비 교부 또는 교육청에서 공사 발주하여 조속한 복구 추진

□ 피해규모가 작은 학교에서 집행한 소액복구비(1천만원 미만)에 대해서는 2회 추경 예산에 반영하여 학교로 보전 조치하고, 복구비가 교부되면 추후 정산

붙임 : 1. 태풍 피해에 따른 복구 추진 경위  1부

2. 학교별 피해현황 및 복구소요액  1부

(붙임 1)

태풍 피해에 따른 복구 추진 경위

□ 2007. 9. 17 학교시설피해 조사단 구성 및 피해학교 현장 확인

□ 2007. 9. 18 학교시설피해 복구대책 협의회 개최

□ 2007. 9. 18. 교육시설재난공제회 학교 피해현황 조사 및 복구비 조속 지원 요청

□ 2007. 9. 19~ 9. 20. 교육시설재난공제회 학교 피해현장 조사 (3명)

□ 2007. 9. 21. 태풍피해복구에 따른 예비비 사용 결정 및 시설비 집행잔액 사용 승인

- 대상학교(6개교) : 월랑초, 함덕초, 연평초․중, 함덕중,

조천중, 함덕정산고,

□ 2007.10. 1~10. 5. 중앙재난안전대책본부 합동 조사(교육인적자원부 조사관 실사 )

□ 2007.10. 2. 세화고등학교 - 다목적강당 보수 및 교실외벽 보수ㆍ방수 공사 업체에 태풍 피해 선 시공 지시

(설계변경)

□ 2007.10. 8. 교육시설재난공제회 복구비 신청

구 분	제주시교육청	서귀포시교육청	도교육청	계
신청 학교수	27교	14교	17교(기관포함)	58교
신 청 금 액	1,549,209천원	69,570천원	798,339천원	2,417,118천원

- 사립학교 : 6교(오현고는 현재 복구비 산정 중에 있어 미포함)

- 사립학교 복구비 신청액 :  438,526천원

※ 오현중ㆍ고등학교 급식소 및 급식기자재 피해 자체 복구 완료(현재 정상적인 급식실시)

□ 2007.10. 8. 제주중앙여자고등학교 - 교실외벽보수공사와 병행하여 공사 발주

□ 2007.10. 19. 교육시설재난공제회 재난복구비 지급결정 통보

- 대상학교 : 19교(고등학교<사립 제주여고, 대기고 포함>, 직속기관)

- 재난복구비 지급결정 통보액 : 711,200천원

□ 2007.10. 22. 태풍피해복구에 따른 예비비 복구 집행잔액 변경사용 및 시설비 집행잔액 사용 승인

- 대상학교(9교) : 북촌초, 제동초, 화북초, 동화초, 신촌초, 제남초, 조천초, 신흥분교장, 제주서중

□ 2007.10. 23 교육인적자원부 특별교부금 신청(기자재 포함)

- 대상학교 : 80교(직속기관 포함)

- 신 청 액 : 1,849,832천원