2007년도 공유재산관리계획 변경안

(친환경농업첨단연구센터조성부지매입및신축)

제 주 특 별 자 치 도

2007년도 공유재산관리계획 변경안

(친환경농업첨단연구센터조성부지매입및신축)

의안 번호	514	제출일자 : 2007년 11월 일 제 출 자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

○.지역균형 발전을 도모하고 친환경첨단농업 과학기술의 개발보급으로 청정1차 산업의 새로운 성장 동력을 창출하기 위하여 서귀포시 강정동 3426-3번지 외3필지23,783㎡매입하여 기존 도유지와 합병 후 3,000㎡ 규모의 친환경농업첨단연구센터를 신축하기 위하여

○.지방자치법제39조제1항제6호, 공유재산 및 물품관리법 시행령제7조, 공유재산관리조례제11조제1항의 규정에 의거 2007년도 공유재산관리계획(변경)안에 대한 의결을 얻기 위함.

2. 사업개요

○ 소 재 지 : 서귀포시 강정동 3458번지 일원

○ 매입 부지면적 : 23,783㎡(7,194평)

○ 건물 신축면적 : 3,000㎡(907평)

○ 주요시설

- 실험실. 분석실. 교육장. 시험포장 등.

○ 사 업 비 : 136억원(2007년도 46억원 확보)

○ 사업기간 : 2007.10 ~ 2010

○ 사업주관 : 농업기술원

3. 기대효과

○ 친환경 첨단 농업기술의 개발 보급으로 1차산업 전략기지화

○ FTA 협상등 농업환경변화에 대응하여 농업경쟁력를 강화하고

제주농업, 농촌 발전이라는 농업인의 요구에 부응

4. 공유재산관리계획서 : 별지와 같음

5. 참고자료

○ 사업계획서 : 별첨

○ 도면 및 사진

공유재산관리계획서

제주특별자치도

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

구 분			상 반 기			하 반 기			합 계			비 고
			건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액
취득	계	토 지 건 물 기 타				4 1	23,783 3,000	1,000,000 5,127,000	4 1	23,783 3,000	1,000,000 5,127,000
	매입	토 지 건 물 기 타				4	23,783	1,000,000	4	23,783	1,000,000
	기 타 취 득	토 지 건 물 기 타				1	3,000	5,127,000	1	3,000	5,127,000
처분	계	토 지 건 물 기 타
	매 각 (멸실)	토 지 건 물 기 타
사용 및 대부		토 지 건 물 기 타

2007년 취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재 산 의 표 시			추정 가격	취득 시기	취득사유	취득재산 소유자와 주소, 성명	비고
	지목 (구조)	소 재 지	면적
1	토지	서귀포시 강정동 3436-3	6,473	406,743	하반기	친환경농업첨단연구센테 조성부지	서귀포시 강정동 3436-3 허종면
2	토지	서귀포시 강정동 3485	9,190	307,985	“	“	서울시 강남구 역삼동831-36후림개발(주)
3	토지	서귀포시 강정동 3487-1	3,587	120,211	“	“	“
4	토지	서귀포시 강정동 3488-1	4,533	165,061	‘	“	서귀포시 강정동 4048-18 김명관
5	건물	서귀포시 강정동3458일원	3,000	5,127,000	“	친환경농업첨단연구 센터건물신축	신 축

친환경농업 첨단 연구센터조성 사업계획서

□ 조성개요

□ 위    치 : 서귀포시 강정동 3458번지 일원(혁신도시 서측 2㎞)

□ 부지확보 : 114천㎡(기존 45천㎡, 매입 69천㎡)

□ 세부시설 : 첨단연구센터 3,000㎡ 유리온실 및 하우스 46,000㎡

전시 및 교육시설 등(기존시설 1,400㎡활용)

□ 사 업 비 : 136억원(국비 54, 도비 82)

□ 조성기간 : 2007 ~ 2010년(4개년)

□ 추진상황

□ 2006. 4월 : 친환경농업 첨단연구기반 구축(기본안)이전계획 보고

□ 2006. 9월 : 후보지 적합성 조사 T/F팀 구성운영(17명)

□ 2007. 3월 : T/F팀 운영결과 보고(22개 지역 → 3개 지역)

□ 2007. 7월 : 친환경농업 첨단연구기반 구축(안)수립

□ 2007. 9월 : 농업인단체 간담회(2회) 개최 및 계획설명

□ 2007.10월 : ‘07용역심의, 중기지방재정계획 및 투융자심의

□ 향후계획

□ 2007. 11월 : 공유재산관리계획 심의, 용역과업지시서 작성

□ 2008.  1월 : 도시계획시설 결정용역, 사전환경성 검토용역,

사전재해 영향성검토용역, 건축계획 및 실시설계용역 등 발주

□ 2008.하반기 : 공사발주 및 착공

□ 지적도

□ 위치도

친환경농업 첨단연구센터

□ 현장사진