2008년도 공유재산관리계획안

(곶자왈 자연 생태체험관 건립 사업)

제 주 특 별 자 치 도

2008년도 공유재산관리계획안

(곶자왈 자연 생태체험관 건립 사업)

의안 번호	517	제출일자 : 2007년 11월 일 제 출 자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

○ 우리도의 귀중한 자연자산인 곶자왈을 영구히 보전하기 위하여 추진하는 곶자왈 공유화사업의 일환으로 제주시 조천읍 교래리 산95번지 일원에 연면적 1,320㎡규모의 곶자왈 생태체험관을 신축하여 IT기술을 활용한 곶자왈 콘텐츠를 개발 운영함으로써 새로운 모형의 자연생태체험 기반시설을 구축 하고자 하는 사업으로서

○ 지방자치법 제39조제1항제6호, 공유재산 및 물품관리법 시행령제7조, 공유재산관리조례 제11조제1항의 규정에 의거 2008년도 공유재산관리계획안에 대한 의결을 얻기 위함.

2. 사업개요

○ 소 재 지 : 제주시 조천읍 교래리 산95번지 일원

○ 부지면적 : 91,402㎡(지적면적)

○ 건물 신축면적 : 연면적 1,320㎡(2개동) → 지하1층․지상1층

○ 주요시설

- 전시동(900㎡) : 영상실, 체험교육실, 전시실, 기계실

- 업무동(420㎡) : 회의실, 사무실

○ 사 업 비 : 2,500백만원(국비 1,250, 지방비 1,250)

○ 사업기간 : 2008 ~ 2009

○ 사업주관 : 제주특별자치도 환경정책과

3. 기대효과

○ 제주고유의 자연자인 곶자왈의 생태적 가치보전 및 공유화 운동 활성화

○ 곶자왈 생태체험관 건립을 통해 체계적인 환경교육의 장 마련

○ 제주가 환경연수원의 기능을 할 수 있는 기본 인프라 구축

4. 공유재산관리계획서 : 별지와 같음

5. 참고자료

○ 사업계획서 : 별첨

○ 도면 및 사진

공유재산관리계획서

제주특별자치도

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

구 분			상 반 기			하 반 기			합 계			비 고
			건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액
취득	계	토 지 건 물 기 타				2동	1,320	2,500,000	2동	1,320	2,500,000
	매입	토 지 건 물 기 타
	기 타 취 득	토 지 건 물 기 타				2동	1,320	2,500,000	2동	1,320	2,500,000
처분	계	토 지 건 물 기 타
	매 각 (멸실)	토 지 건 물 기 타
사용 및 대부		토 지 건 물 기 타

2007년 취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재 산 의 표 시			추정 가격	취득 시기	취득사유	취득재산 소유자와 주소, 성명	비고
	지목 (구조)	소 재 지	면적
1	건물	제주시 조천읍 교래리 산95번지 일원	1,320	2,500,000	2008년 - 2009년	곶자왈 자연생태 체험관 신축	신축

곶자왈 자연생태체험 기반시설 구축

□ 목    적

○ 우리도의 귀중한 자연자산인 곶자왈을 영구히 보전하기 위하여 추진하는 곶자왈 공유화 사업의 일환으로서

○ 곶자왈 생태체험관, 관찰로 설치 및 IT기술을 활용한 곶자왈 콘텐츠를 개발 운영함으로서 새로운 모형의 자연생태체험 기반시설 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 제주시 조천읍 교래리 산95번지 일원

(교래곶자왈, 교래자연휴양림 사업지구내)

○ 사업기간 : 2008 ～ 2009

○ 사 업 량

- 곶자왈 생태체험관 신축(2개동,  1,320㎡,  지하1층․지상1층)

- 생태관찰로 시설 보강(B=1.2m,  L=3.54㎞)

- 사이버 곶자왈 정보시스템 구축(1식)

○ 총사업비

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2008	2009	2010이후
계	2,800		2,000	800
국 비	1,400		1,000	400
도 비	1,400		1,000	400

※ 사업비 세부내역

- 곶자왈 생태체험관 신축 및 생태관찰로 시설 보강 : 2,500백만원

- 사이버 곶자왈 정보시스템 구축 : 300백만원

□ 사업추진계획

○ 기본 및 실시설계 용역 : '08. 1 ～ 5

○ 곶자왈 생태체험관, 관찰로 등 기반시설 조성 : '08. 6 ～ '09. 9

○ 사이버 곶자왈 정보시스템 구축 : '09. 1 ～ 9

- 곶자왈 식생, 지형․지질 등 조사․분석 : '09. 1 ～ 6

○ 곶자왈 생태체험관 개관 : '09. 10

□ 세부시설운영계획

○ 곶자왈 생태체험관

▸ 전시기능

- 곶자왈 영상물 상영 및 곶자왈을 활용한 콘텐츠 전시

- 곶자왈 관련 도서, 간행물, 영상물 등 자료 비치 열람

- 기획·상설전시계획에 의한 전시프로그램 운영

▸ 조사․연구기능

- 곶자왈을 활용한 콘텐츠 및 상품 개발

- 곶자왈 생태 연구 수행

- 곶자왈 등 환경 보전을 위한 각종 세미나 및 회의 개최

▸ 체험․교육기능

- 곶자왈 생태해설사 및 생태관광가이드 양성 교육 추진

- 환경체험 및 교육 프로그램 운영

○ 생태관찰로 시설 보강

- 기존 생태관찰로에 관찰데크, 해설판 등 체험학습시설을 설치하여 곶자왈의 다양한 생태를 직접 체험할 수 있도록 시설 보강

□ 기대효과

○ 제주 고유의 자연 자산인 곶자왈의 생태적 가치 보전 및 공유화 운동 활성화

○ 곶자왈 생태체험관 건립을 통해 체계적인 환경교육의 장 마련

○ 제주가 환경연수원의 기능을 할 수 있는 기본 인프라 구축

< 현 장  위 치 도 >

생태관찰로 시설 보강 위치(B=1.2m, L=3.54㎞)

곶자왈 생태체험관 위치(2개동,  1,320㎡)

교래자연휴양림 사업지구내 곶자왈 생태체험관

< 지  적  도 >

< 현 장 사 진 >