	제주특별자치도의회 Jeju Special Self-Governing Provincial Council	2011. 3.10(목).10:-17:00

현장방문 활동계획

환경도시위원회

제280회 제주특별자치도의회 임시회

환경도시위원회 제1차 회의

2011. 3. 9(수).14:30

현장방문 활동계획(안)

○ 일 시 : 2011. 3. 10(목) 10:00～ 17:00

○ 장 소

▪어승생 제2수원지 건설사업 현장

▪삼양 제2오수펌프장

▪붉은오름자연휴양림 조성사업 현장

▪구좌읍 월정리 해안도로

환경도시위원회

현장방문 활동계획(안)

ꏚ 일  시 : 2011. 3. 10(목) 10:00～17:00

ꏚ 방문장소

○ 어승생 제2수원지 건설사업 현장 ○ 삼양 제2 오수 펌프장

○ 붉은오름자연휴양림 조성사업 현장 ○ 구좌읍 월정리 해안도로

ꏚ 방문자 : 11명

○ 환경도시위원회 의원 : 6명

○ 환경도시 전문위원실 : 5명

ꏚ 주요활동내용

○ 의정활동을 위한 사업현장 확인

ꏚ  협조를 얻어야 할 사항

○ 의정활동 사진촬영 및 차량지원 : 총무담당관실

ꏚ 세부일정

시 간	내 용	비 고
10:00～10:20(20´)	이동(도의회→어승생 제2수원지 사업 현장)
10:20～10:40(20´)	어승생 제2수원지 사업 현황청취 및 현장 확인
10:40～11:00(20´)	이동(어승생→삼양제2오수펌프장)
11:00～11:20(20´)	삼양 제2오수 펌프장 현장 확인
11:20～12:30(50‘)	식사장소 이동
12:30～13:30(60´)	식사
13:30～14:00(30´)	이동(식사장소 → 붉은오름자연휴양림조성사업장)
14:00～14:30(30‘)	붉은오름자연휴양림조성사업 현황청취 및 현장 확인
14:30～15:10(40´)	이동( 자연휴양림→구좌읍 월정리 해안도로)
15:10～15:30(20´)	구좌읍 월정리 해안도로 현장 확인
15:30～16:30(60´)	이동(구좌읍→ 도의회)

어승생 제2저수지 건설사업

ꏚ 사업의 배경 및 목적

○ 중산간지역(해발 200～600m)의 유일한 상수원으로 이용하고 있는기존 어승생 저수지 용량부족(10만톤)으로 가뭄시 빈번한 격일제급수로 주민생활 불편 초래

☞ 격일급수 : ‘94년(15일), ’96년(33일), ‘97년(21일), ’01년(16일), ‘07년(20일)

○ 한라산Y계곡 용출량 1,244만톤 중 월류되는 844만톤을 이용

중산간 지역의 근원적 물 문제 해소

☞  급수혜택 : 21개 마을, 25,690명(25천톤/일), 목장지 60개소 등

ꏚ 사업개요

○ 위      치 : 제주시 해안동 2821-1번지(1100도로 인근)

○ 사업기간   : 2009 ～ 2012. 12(6개년)

○ 사업시행자 : 제주특별자치도지사

○ 사업내용   : 저수시설 50만톤, 정수시설 1만톤, 도․송수관로 20.4㎞

○ 사 업 비   : 518억원(국비 259억원, 지방비 259억원)

【연차별 투자계획】

구 분	계	‘09까지	‘10 투자	11 계획	향후계획
계	51,801	5,298	13,900	20,802	11,801
국 비	25,900	3,000	10,000	7,000	5,900
지방비	25,901	2,298	3,900	13,802	5,901

(단위 : 백만원)

ꏚ 추진상황 : 전체 진도 41%

○ 저수지 시설  : 토공 82만㎥중 56만㎥ 완료

- ‘11. 2. 23～12. 22 : 저수지시설공사(2차분) 착수(98억원)

○ 도․송수관로 : 전체 20.4㎞중 15.8㎞ 완료

ꏚ ‘11년 추진계획 : 208억원

○ 저수지 시설  : 토공 23만㎥, 댐체축조 15만㎥, 차수시트 45천㎡

○ 관로분야 4.6㎞, 정수시설 1만톤, 전기계측제어시설 1식 등 시행

삼화지구 오수 및 우수처리시설  관련 청원

◈ 삼화지구(화북)에서 발생하는 오수를 삼양2 중계펌프장으로 유입 시키지 말고 타 지역으로 보내도록 강력히 요구하였으나

◈ 지속적인 대화로 삼양3동 어촌계 및 해녀회에서 동의가 되어 사업자인 한국토지주택공사에서 차집관로 공사를 시행하는 단계에서

◈ 청원인들이 삼화지구내 화북지역은 화북중계펌프장으로 이송 요구

❏ 사업개요

❍ 위  치 : 화북1,2동, 삼양2동, 도련1,2동 일원

❍ 면  적 : 975천㎡ (화북지역 252, 삼양지역 723)

❍ 사업시행자 : 한국토지주택공사

❍ 계획하수량

구 분	계	화북지역	삼양지역	비 고
하수량(㎥/일)	7,060	2,490	4,570	일 최대

※ 기존 화북주공 APT 일최대 하수발생량 2,577㎥

❏ 삼양2중계펌프장 현황

❍ 펌프용량 : 7㎥/분×3(1)대

❍ 일 최대 펌핑 가능량 : 13,440㎥ (시간최대 : 20,160㎥)

❍ 계획하수량

구분(㎥/일)	2009	2010년	2015년	2020년	2025년
일최대계획하수량	5,500	6,060	11,340	13,100	14,700
시간최대계획하수량	8,250	9,090	17,010	19,650	22,050

❏ 처리방안

❍ 집중호우시 월류에 따른 어장피해를 최소화 하기 위하여 월류수 처리시설(CSOs공법) 설치 추진

⇒ LH에서 1,000톤 규모 시설(도로점용 행정절차 이행중)

❍ 2011년 추경시 예산확보후 하수처리구역 조정에 따른 설계용역 시행 및 공사추진

⇒ 삼화지구내 화북지역은 펌프장 신설후 화북중계펌프장으로 이송

(기존 주공APT에 설치된 펌프장 활용방안 검토중)

붉은오름자연휴양림 조성사업

ꏚ 사업의 배경 및 목적

○ 산림자원을 효과적으로 활용하여 산림욕․등산 등 국민보건 증진과 정서함양 기여하고 청소년들의 자연학습 체험공간 제공

ꏚ 사업의 내용

○ 위    치 : 서귀포시 표선면 가시리 산158

○ 사업규모 : 휴양림 조성 190ha(개발면적 : 42,744㎡)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2015

○ 사 업 비 : 12,000백만원(광특 6,822, 지방비 5,178)

○ 시 행 자 : 제주특별자치도 서귀포시

○ 도입시설 : 편익시설 - 관리사무실(1동), 야영장, 휴양관(1동) 등

위생시설 - 공중화장실(3동), 오수처리시설 등

교육시설 - 포레스트아카데미, 상잣성 데크로드 등

체육시설 - 다목적 구장, 등산로 등

ꏚ 2010까지 추진실적

○ 산림청 자연휴양림 지정고시 : 2005. 4. 15

○ 개발사업 및 조성계획 승인 : 2007. 8. 17

○ 2010까지 추진사업  : 5,109백만원

․편익시설 : 관리사무소(1동), 진입도로 및 주차장, 휴양관(1동)

자연생태원(잔디광장, 생태연못), 야영시설 등

․위생시설 : 오수처리시설(90ton), 지하수관정(100ton), 화장실(1동)

ꏚ 2011 추진계획

○ 사 업 비 : 850백만원(광특 400, 지방비 400, 자체 50)

○  사업내용  : 다목적구장, 순환산책로, 물품보관실(빨래건조실),

화장실, 진입로 정비 등

월정리 해안 모래날림 피해 현황

◈ 구좌읍 월정리 해안가 모래 날림현상으로 해안도로 교통사고 우려와 해안도로 개설 후 10여년간 반복적인 인근 주택가 피해 발생으로 대책 마련이 시급 ⇒‘11.2.14~2.16 제주MBC 집중보도

◈ 지역주민의 반복적인 생활불편 해소와 안정적인 정주 (定住)환경개선 위해 모래날림 차단 및 전문 용역을 통해 항구적인 안전대책 강구

⇒‘11. 2. 21 도의회 업무보고시 안동우 의원 대책 요구

ꏚ 해안사구 형성 등 피해상황 분석

❍ 월정리 해안가는 겨울철(11월～3월) 조류(북서풍영향)로 인해 모래언덕이 형성되어 강풍에 모래날림현상으로 해안도로 차량통행 지장 및 인근 주택가 피해가 발생

- 원인은 방파제시설 및 해안도로 개설로 연안환경 변화 추정

❍ 마을주민들은 매년 반복되는 현상임에도 아직까지 항구적인 대책 없이 일시적으로 쌓인 모래를 치우고 현상유지(방치)

⇒ 모래날림 방어막(높이 70～80cm) 설치 주문(월정리장)

❍ 삼양검은모래 해변의 경우 매년 모래 해변 바닥 및 인근에 차광막, 방사막 등을 설치하는 등 피해 최소화

ꏚ 향후 피해저감 및 개선대책

< 1단계 : 모래날림 방지시설 >

❍ 해안변에 모래날림 부직포 및 차폐시설을 설치하여 모래가 도로 및 인근 주택에 등에 넘어오지 못하도록 비사방지 설치

- 사업량 : 차광막 덮기 L=400m, B=15m(6,000㎡) -소요사업비 : l0백만원

< 2단계 : 항구대책 >

❍ 장기적으로는 조류에 의한 모래유입 방지 등 연안 환경변화에 대비한 용역을 시행하여 항구적인 피해예방대책 수립 및 해안도로를 이설 검토