2012년도 공유재산관리계획(안)

(서귀포시 다목적 체육관 신축)

2012년도 공유재산관리계획

(서귀포시 다목적체육관 신축)

의안 번호	445	제출일자 : 2011년 11월 일 제 출 자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

❍ 2014년 전국체육대회의 성공적인 개최를 위하여 서귀포시  공천포 전지훈련센터에 다목적 실내체육관을 신축함으로써 실내외 훈련이 가능한 전천후 스포츠전지훈련센터로의 활용과 함께 기 조성된 부지와 시설을 최대한 활용함으로써 부지매입비 절감 및 체육시설의 집단화로 경기장 관리의 효율성 증대가 기대되는 건립사업으로,

❍ 지방자치법 제35조 제1항 제6호, 공유재산 및 물품관리법제10조 동법 시행령 제7조, 제주특별자치도 공유재산관리조례 제10조의 규정에 의거2012년 공유재산관리계획(안)에 대한 의결을 얻기 위함.

2. 사업개요

❍ 위    치 : 서귀포시 남원읍 신례리 334번지 일원

❍ 부지면적 : 142,042㎡ (공천포전지훈련센터내)

❍ 사업규모 : 지상2층, 연면적 3,300㎡

❍ 사업기간 : 2012. 1월 ~ 2013. 6월

❍ 사 업 비 : 3,900백만원 (국비 1,170  도비 2,730)

❍ 사업주관 : 제주특별자치도 전국체전기획단 (서귀포시 스포츠지원과)

❍ 주요시설 : 다목적경기장(50m*30m), 선수휴게실, 심판실, 관람석등

3. 기대효과

❍ 2014년 전국체전대비 시설물 확충을 통한 성공적인 대회 개최

❍ 각종 국내외 스포츠대회 유치로 스포츠메카로서의 이미지 제고

4. 공유재산관리계획서 : 별지와 같음

5. 참고자료

❍ 사업계획서 : 별첨

❍ 위치도 및 현장사진

공유재산관리계획서

제주특별자치도

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

구 분			상 반 기			하 반 기			합 계			비 고
			건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액
취득	계	토 지 건 물 기 타				1	3,300	3,900,000	1	3,300	3,900,000	2013년 취득
	매입	토 지 건 물 기 타
	기 타 취 득	토 지 건 물 기 타				1	3,300	3,900,000	1	3,300	3,900,000
처분	계	토 지 건 물 기 타
	매 각 (멸실)	토 지 건 물 기 타
사용 및 대부		토 지 건 물 기 타

2012년 취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재 산 의 표 시			추정 가격	취득 시기	취득사유	취득재산 소유자와 주소, 성명	비고
	지목 (구조)	소 재 지	면적
1	건물	서귀포시 남원읍 신례리 334번지 일원	3,300	3,900,000	2013년 하반기	2014년 전국체전대비 부족경기장 시설물 확충	제주특별자치도

서귀포 다목적체육관 신축공사

❍ 2014년 전국체전 개최에 대비하여 공인규정에 맞는 핸드볼 경기장 건립

․전국체전 종목중 실내체육관 규모가 큰 핸드볼 종목 개최

▶  다목적체육관 경기장 규모 : 50m × 30m

❍ 향후 공천포전지훈련센터내 전천후 다목적체육관으로 활용

․실내체육관 확보로 전지훈련센터 실내외 훈련이 가능

▶ 기존 공천포전지훈련센터 시설현황

경기장 1개소(육상트랙, 축구), 축구보조구장 2면, 테니스장 8면,

게이트볼장 1개소, 야구장 1개소, 트레이닝센터 1개소

□ 사 업 개 요

❍ 위    치 : 서귀포시 남원읍 신례리 334 일원

❍ 부지면적 : 142,042㎡ (공천포전지훈련센터내)

❍ 면    적 : 연면적 3,300㎡

❍ 규    모 : 지상 2층

❍ 사업기간 : 2012. 1월 ~ 2013. 6월

❍ 사 업 비 : 3,900백만원 (국비 1,170  도비 2,730)

❍ 사업주관 : 제주특별자치도 전국체전기획단 (서귀포시 스포츠지원과)

❍ 주요시설 : 다목적경기장(50m*30m), 선수휴게실, 심판실, 관람석등

□ 사업예산 확보계획

(단위:백만원)

구분	계				2012년				2013년 이후
	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타
건물취득	3,900	1,170	2,730	-	3,667	1,100	2,567	-	233	70	163	-

□ 추진계획

❍ 기본․실시설계 발주 및 수행 : 2012. 2. ~ 8.

❍ 도시계획시설 세부시설변경등 인허가 : 2012. 7월한

❍ 서귀포다목적체육관 공사 수행 : 2012. 9. ~ 2013. 6.

□ 기대효과

❍ 2014년 전국체육대회 시설물 확충을 통한 성공적인 대회 개최

❍ 공천포전지훈련센터내 실내체육관 건립으로 기존 시설과 연계한 전천후 스포츠 전지훈련 센터 기반 구축

❍ 체육시설의 집단화로 경기장 관리운영의 효율성 기대

□ 위 치 도

□ 현장사진

□ 기존 공천포전지훈련센터

공천포 전지훈련센터 (육상, 축구장/천연 - 각 1면)

공천포 전지훈련센터 (축구 보조구장/인조 - 2면)

공천포 전지훈련센터 (테니스장 - 8면)

공천포 전지훈련센터 (트레이닝 센터)

공천포 전지훈련센터 (야구장)

공천포 전지훈련센터 (게이트볼장)