제297회 제주특별자치도의회 제1차정례회

환 경 도 시 위 원 회

2012. 7.

주 요 업 무 보 고

WCC추진기획단

순      서

□		일 반 현 황
□		비전 및 추진전략
□		2012년 주요업무계획
	❍		2012 WCC 제주추진지원본부 구성․운영
	❍		2012 제주 WCC 범도민지원위원회 운영 활성화
	❍		2012 WCC 제주 주관 공식 프로그램 운영
	❍		세계지방정부 정상 포럼 개최
	❍		2012 제주 WCC 환경대축제
	❍		친환경 방문객 지원시설 조성
	❍		세계가 찾는 명품 생태문화관광 인프라 구축
	❍		WCC 행사장 친환경 개선사업 추진
	❍		ICC 신재생 에너지 구축사업 추진
	❍		IUCN 기념 숲 및 상징물 조성
	❍		WCC 친환경 교통 인프라 구축
□		도정질문 추진상황
□		2011년 행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

일  반  현  황

□ 기구 및 인력현황

□ 기    구

					WCC추진기획단장
					WCC총괄기획팀장
	행사총괄담당 (5명)					프로그램담당 (4명)					환경인프라담당 (5명)

□ 인력현황

구 분	계	2급	4급	5급	6급	7급	8급 및 기타
인 원	16명	1	2	2	4	4	3

□ 주 요 업 무

팀 명	담 당	주 요 업 무
WCC 총괄기획팀	행사총괄담당	○ 행사기획 및 의전업무 지원 총괄 ○ 조직위 및 중앙부처 업무협의 ○ 행사관련 위원회 구성 및 운영 등 ○ 홍보업무 총괄 및 부대행사 운영
	프로그램담당	○ 제주형 의제 및 프로그램 개발 ○ WCC연계 축제 및 이벤트 추진 ○ 행사 교통, 숙박 운영 지원
	환경인프라담당	○ 친환경 회의장시설 조성 ○ 생태문화탐방로 조성 등 기반시설 ○ 도시환경정비 및 신재생에너지 조성 ○ 의료, 소방, 안전, 위생, 자원봉사지원 등

□ 업무연계도

	중 앙 정 부				⇔		제주특별자치도						⇔		IUCN
	WCC조직위원회 (위원장 : 이홍구 전총리)				⇔		WCC추진기획단						⇔		IUCN총회준비위(CPC) (위원장 : 페레라노 미구엘)
			정부지원위원회
																	환경부 협력관
			실무지원위원회														제주특별자치도 협 력 관
	사무처장(고위공무원)						기획단장(2급)								IUCN사무국장

□ 2012 제주 WCC(세계자연보전총회) 개요

❍ 기간 : 2012. 9. 6 ～ 9. 15(10일간) ＊환경대축제 : 8. 16～9. 15(31일간)

*  세부일정 : 개회식(9.6), 세계보전포럼(9.7～11), IUCN 회원총회(9.8～15),

세계리더스대화(9.7～11), 세계지방정부정상포럼(9.4～6),

세계국립공원청장회의(9.8), 공식투어(9.13), 폐회식(9.15)

❍ 장소 : 제주국제컨벤션센터(ICC Jeju) 및 도일원

❍ 주최 : IUCN(세계자연보전연맹), 환경부, 제주특별자치도

❍ 구성 및 내용

- 세계보전포럼(World Conservation Forum)

□ 워크숍, 원탁회의, 포스터 전시 등을 통한 환경현안에 대한 토의

- 회원총회(Members' Assembly)

□ IUCN 정관 개정, 발의문(Motion)을 결의문 또는 권고문으로 채택

- 세계리더스대화(World Leaders' Dialogue)

□ 국가원수, 전문가 등이 청중과의 대화를 통해 미래 환경비전 제시

- 특별행사

□ 세계국립공원청장회의(환경부 주관)

□ 세계지방정부정상포럼(제주도 주관)

- 환경대축제

□ 워크숍, 전시회, 지식카페, 환경교육․체험 프로그램

□ WCC 연계 축제 : 세계유기농한식축제, 세계생태관광축제 등

❍ 슬로건

- 자연+(Nature+) : 자연 및 이와 관련된 다양한 이슈로의 확장을 의미

*  ‘+’의  함의  :  긍정(Positive), 더욱(More), 나은(Better), 부가가치(Added Value), 함께하는(Works together), 떨어질 수 없는(Can't be apart), 긴급(Urgent)

❍ 공식로고

- 의미 :  “자연보전의 가치 확산을 꽃피우다”

비전 및 추진전략

비전 및 추진전략

비전	도민이 행복한 국제자유도시

세계자연보전총회 성공개최로 세계환경수도 도약기반 조성

정책목표	추 진 과 제
성공개최 기반 인프라 구축	∙ 친환경 전시장 등 Hardware 인프라 구축 ∙ 생태해설사 양성 등 Software 프로그램 마련 ∙ 세계적 수준의 생태문화관광 인프라 구축
도민의 능동적 참여 기반 마련	∙ 지역․기관․단체별 특화된 참여 프로그램 마련 ∙ 도민의 환경의식 선진화 시스템 마련
지속적 국제환경 협력 기반 구축	∙ IUCN 등 국제환경 협력 시스템 구축 ∙ 2020 세계환경수도 조성을 위한 선언문 채택 기반 마련
제주녹색성장 기반 조성	∙ 친환경 회의시설 및 교통체계 구축 ∙ 행사장 신재생 에너지 사업 추진

2012년 주요업무계획

2012 제주 WCC 제주추진지원본부 구성․운영

❍ 2012제주WCC 추진전략과 종합적인 준비상황을 공유, 도정 전반과 범도민적인 총체적 협력 추진

❍ 도내 유관기관․단체와 유기적인 협조체제 구축으로 2012제주 WCC 성공개최를 위한 원활한 협력 및 지원 대책 마련

□ 구성개요

❍ 구    성

- 본부장(도지사), 부본부장(환경․경제부지사)

- 13개 추진․지원단장(국․본부장, 행정시부시장)

- 교육청, 경찰청, 출입국관리사무소, 관광협회 등 16개 협력 기관․단체

❍ 운영기간 : ‘12. 2. 15 ~ WCC 종료시까지

❍ 주요역할

- 숙박, 수송, 소방 등 추진․지원단별 과제 선정 및 계획 수립․추진

- 협력 기관․단체 WCC 참여 홍보 및 참가자 편의 지원

□ 추진실적

❍ 추진지원본부 구성을 위한 유관기관 실무회의 개최(‘11.12.16)

- 지원단 및 협력기관 역할 및 추진과제 확정

❍ 제주추진지원본부 1차구성회의(‘12.2.15), 협의회의(‘12.2.24),

❍ 2차보고회의(‘12.3.29), 3차보고회의(‘12.5.17), 4차보고회의(‘12.6.28)

- 49개 과제 추진상황 보고, 지역축제지원위원회 사례 발표, 토론 등

□ 향후계획

❍ 월 1회 정기 보고회의 개최 및 종합상황실 운영(‘12.8.16~9.15)

- 종합적인 준비상황 점검 등 완벽한 준비체제 구축

2012 제주 WCC 범도민지원위원회 운영 활성화

❍ 2012제주WCC 성공개최를 위해 도민의 자발적 참여 분위기 확산 및 능동적 활동 강화

❍ 도민의 환경역량 결집으로 WCC개최 준비 지원체계 구축

□ 구성개요

❍ 구    성 : 12개분과 345명(위원장 고충석, 오경애)

❍ 운영기간 : ‘10. 1. 26 ~ WCC 종료시까지

❍ 운영방법 : 분과위원회별 자체 활동계획 수립 추진

❍ 주요역할 : 워크숍, 포럼, 캠페인 등을 통한 도민 홍보 추진

□ 추진실적

❍ 범도민지원위원회 출범(‘10.1.26)

❍ 확대 개편 : 8개분과․126명 → 12개분과․345명(‘11.9.24)

❍ 행정시 및 읍면동 단위 지원위원회 구성․운영

- 제주시 26개 읍면동 629명, 서귀포시 4개분과 399명

❍ 활동 추진 : 25회(전체회의 3, 분과회의 19회, 기타회의 3회)

- WCC 계기 제주 녹색산업 발전 심포지엄(‘11.8.31)

- WCC 성공개최 분위기 조성을 위한 생태문화 탐방(‘11.9.22)

- WCC 제주 주제별 포럼 및 이벤트 논의(‘11.10.13)

- WCC 성공개최를 위한 워크숍 개최(‘11.12.27)

- WCC 성공개최를 위한 결의대회 개최(‘12.1.10)

- 세계환경수도와 국제녹색섬포럼 발전 방향 토론회(‘12.2.18)

- 환경대축제 프로그램 발전방안 토론회(‘12.5.3)

- WCC와 연계한 녹색섬의 거버넌스 구축방안 토론회(‘12.6.1)

□ 향후계획

❍ WCC 범도민 홍보 및 참여 분위기 조성을 위한 분과별 활동 추진

- 분과회의, 워크숍, 전문가 토론회 등 개최

2012 WCC 제주 주관 공식 프로그램 운영

세계적인 환경분야 리더들에게 제주의 환경자산, 문화, 역사 소개하고 직접 교류하여 제주의 환경자산 가치와 보전 정책에 대한 공감대 형성

□ 운영개요

❍ 운영기간 : ‘12. 9. 6 ~ 9. 15(총회기간중)

❍ 운영주체 : 제주특별자치도

❍ 주요내용

- 제주 주최 WCC 공식 프로그램 : 15개

ㆍ워크숍(5개) : IUCN 세계환경수도 모델도시 조성 및 평가인증 시스템 구축 방안 등

ㆍ지식카페(2개) : 에너지 이용의 효율성 증대를 위한 제주지역 지능형 전력망 실증 사업 등

ㆍ포스터(8개) : 제주 한라산, UNESCO 생물권보호지역 등

- 제주 파빌리온 운영 : 제주도 환경정책, 문화, 역사 등 홍보

ㆍ기간/규모 : 9. 6 ~ 9. 15 / 90㎡

ㆍ홍보․전시관 및 이벤트관으로 운영

※ 2012 제주 WCC 공식 프로그램 : 480개 프로그램

- 워크숍 137, 지식카페 127, 보전캠퍼스 48, 포스터 154,

파빌리온 7, 세계리더스 담화 5, 특별프로그램 2

□ 추진실적

❍ 제주 단독 운영 워크숍 및 이벤트 신청(‘11.10) 및 확정(’12.2)

❍ 프로그램별 운영주체 선정 및 세부 계획 수립(‘12.5)

❍ 제주 파빌리온 기본계획 수립(‘12. 6)

□ 향후계획

❍ 제주 파빌리온 세부운영 계획 수립 : ‘12. 7

❍ 제주 주관 프로그램 및 파빌리온 운영 : ‘12. 9. 6 ~ 9. 15

세계지방정부 정상 포럼 개최

❍ 2012 세계자연보전총회 특별행사로 제주를 세계적인 친환경도시로 조성하기 위한 세계환경수도 프로젝트의 비전을 공유하는 논의의 장

❍ 국제기구와 연계한 지방정부 차원에서의 환경문제에 대한 접근방법 및 협력체계 마련

□ 사업개요

❍ 행 사 명 : 세계지방정부 정상포럼

(World Local Governments Summit)

❍ 주    제 : 지속가능한 미래도시를 위한 세계지방정부의 역할

❍ 기    간 : ’12. 9. 4(화) ~ 9. 6(목)

❍ 주    최 : 행안부, IUCN, ICLEI, 제주특별자치도

❍ 참가인원 : 300명

- 국외 : IUCN, UNEP 등 국제기구, 세계지방정부 정상 및 관계자 등 100명

- 국내 : 16개 자치단체, NGO 등 200명

＊ 초청대상 : 세계 20명 내외 지방정부 정상, IUCN 등 국제기구 5명,  국내 15개 시ㆍ도지사

❍ 사 업 비 : 167백만원

□ 추진실적

❍ 세계지방정부 정상 포럼 개최 신청(‘11.10) 및 확정(’11.12)

❍ 세계지방정부 정상 포럼 기본계획 수립(‘12.2)

❍ 세계지방정부 정상 포럼 대행용역 발주(‘12.6)

□ 향후계획

❍ 포럼 참여자(지방정부 정상 및 전문가) 확정 및 세부계획 수립 : ‘12. 7

❍ 세계지방정부 정상 포럼 개최 : ‘12. 9. 4 ~ 9. 6

2012 제주 WCC 환경대축제

❍ 2012 제주 세계자연보전총회의 공간, 대상, 기간의 제약을 벗어나 도민뿐만 아니라 제주를 찾는 국내외 관광객이  WCC 참가자와 함께 환경이라는 주제로 하나가 될 수 있는 진정한 지구촌 환경올림픽으로 승화

□ 사업개요

❍ 기    간 : ‘12. 8. 16 ~ 9. 15 (31일간)

❍ 장    소 : 제주도 전역 11개소

- 제주 : 한라수목원, 설문대여성문화센터, 민속자연사박물관 등 7개소

- 서귀 : 서귀포자연휴양림, 서귀포감귤박물관 등 4개소

❍ 사 업 비 : 2,600백만원 (국비 1,300, 지방비 1,300)

❍ 주요내용

- 환경과 자연 주제로 워크숍, 역량강화 교육 프로그램

- 도민, 관광객, WCC참가자가 함께 즐길 수 있는 각종 전시회, 체험 및 공연 프로그램 등

□ 추진실적

□ 2012 제주 WCC 환경대축제 기본계획 수립 : ‘12. 4. 3

□ 환경대축제 프로그램 의견접수 : 225개 기관□단체/387개 프로그램

□ 환경대축제 지역별 지원위원회 구성 : 9개 위원회 □ 270명

❍ 환경대축제 프로그램 구성에 따른 의견수렴 : ‘12. 6. 27 ~ 28

□ 향후계획

❍ 명품 세계생태관광축제 대행기관 선정 및 계약체결 : ‘12. 7

❍ 여행상품 개발 및 IUCN 회원대상 직접 홍보 등 국내외 다각적인 홍보 : ‘12. 7~8

❍ 행사장별 체험 부스 및 회의장 설치 등 행사장 조성 : ‘12. 8

❍ 환경대축제 개최 및 운영 : 8. 16 ~ 9. 15

친환경 방문객 지원시설 조성

2012 제주WCC 참가자를 위한 숙박공간 및 친환경 안내센터 등을 조성하여 친환경 생태관광 저변 확대 및 지역공동체 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ‘12. 2 ~ 8

❍ 사 업 량 : 32개소

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 500, 지방비 500)

❍ 사업내용

- 기존 시설물을 활용한 친환경 숙박공간 조성(마을회관 등)

- 방문객 전용 쉼터 등 친환경안내센터 공간 조성

□ 추진실적

❍ 친환경 생활공간 조성사업 응모 : ‘11. 12. 26

❍ 친환경 생활공간 조성사업 집행지침 수립 시달 : ‘12. 2. 3

❍ 친환경 생활공간 조성사업 대상지 선정 : ‘12. 4. 23

❍ 친환경 생활공간 조성사업 추진 관계자 교육 : ‘12. 5. 2

❍ 친환경 생활공간 조성사업 실시설계 및 시행 : ‘12. 6

□ 향후계획

❍ 친환경 생활공간 조성사업 준공 : ‘12. 8

❍ 친환경 생활공간 조성사업 정산 및 실적보고 : ‘12. 10

세계가 찾는 명품 생태문화관광 인프라 구축

❍ 세계인과 호흡하는 제주형 생태․문화체험 공간 구축을

통한 2012제주WCC 성공개최 기반 조성

❍ 제주만의 독창적 생태문화프로그램 개발을 통해 세계적인 생태관광메카로 발전

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ‘11. 7 ~ ’12. 8

❍ 사 업 비 : 19,100백만원(2011년 6,400, 2012년 12,700)

❍ 사업내용

- 2012제주WCC 생태․문화체험 탐방코스 조성

- 스토리텔링 개발 및 QR코드를 활용한 생태탐방 모바일 시스템 구축

- 일자리 창출을 위한 전문 직업형 생태․문화해설사 양성

□ 추진실적

❍ 생태문화탐방로 스토리텔링 개발연구용역 착수 : ‘11. 12. 9

❍ 모바일안내시스템 및 생태문화탐방로 실시설계 사업착수 : ‘11. 12. 27

❍ 생태문화 해설사 양성 위탁교육 실시 : ‘12. 3. 31

❍ 생태문화 탐방로 예정지 선정 지역주민 설명회 : ‘12. 1. 27

❍ 생태문화 탐방로 실시설계 용역 완료 : ’12. 6. 7

□ 향후계획

❍ ‘12년 생태문화 탐방로 조성사업 착공 및 완료 : ’12. 7 ~ 9월

❍ 생태문화 해설사 배치 및 운영 : ‘12. 9월

❍ 스토리텔링 개발 및 모바일안내시스템 구축 용역 완료 : ‘12. 8월

WCC 행사장 친환경 개선사업 추진

❍ 2012제주WCC 성공적 개최를 위한 환경친화적 편의시설 구축

❍ 환경회의에 걸 맞는 환경친화적 회의장조성을 위한 ICC제주 시설 개선

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ‘11. 11 ~ ’12. 8

❍ 사 업 비 : 6,660백만원(2011년 3,330, 2012년 3,330)

❍ 보조사업자 : 제주국제컨벤션센터

❍ 사업내용

- 옥상녹화사업, 빌딩에너지 관리시스템, 절전형 승강설비 개선

- 에너지저감형 열원기기 교체, 유리벽면단열시스템공사 등

□ 추진실적

❍ 친환경 개선사업 자문회의 개최 : ‘11. 7

❍ 민간자본보조사업 교부결정(제주도 ⇒ ICC 제주) : ‘11. 11

❍ 입찰 및 계약 요청 (ICC 제주 ⇒ 조달청) : ‘12. 1

❍ 절전형 승강설비 교체 및 개선 완료 : ‘12. 3

❍ 옥상녹화사업 실시설계 완료 및 착공 : ‘12. 4

❍ 냉난방 열원기기 실시설계 완료 및 착공 : ‘12. 5

□ 향후계획

❍ 옥상녹화사업 등 친환경 개선사업 완료 : ‘12. 8

❍ 친환경 개선사업 정산 및 실적보고 : ‘12. 10

ICC 신재생 에너지 구축사업 추진

❍ 2012제주WCC 성공개최를 위한 친환경 컨벤션시설 및 회의환경 구축을 통한 청정에너지 사용으로 친환경녹색도시 이미지 제고

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ‘11. 10 ~ ’12. 8

❍ 사 업 비 : 6,000백만원(국비 3,000  지방비 3,000)

❍ 보조사업자 : 제주국제컨벤션센터

❍ 사업내용 : WCC 행사장 태양광발전시설 1식(751㎾)

- 고정식 발전시설(715㎾), 추적식 발전시설(36㎾)

□ 추진실적

❍ 신재생에너지 구축사업 자문회의 개최 : ‘11. 7

❍ 사업계획서 검토 및 교부결정(도 ⇒ ICC 제주) : ‘11. 10

❍ 실시설계완료 : ‘12. 1

❍ 조달청 계약의뢰 및 입찰공고  : '12. 1.

❍ 전기공사, 구조물공사 및 감리 착수 : ‘12. 2

□ 향후계획

❍ 신재생에너지 구축사업 완료 : ‘12. 8

❍ 태양광발전 및 행사장 전력공급 : ‘12. 9

❍ 신재생에너지 구축사업 정산 및 실적보고 : ‘12. 10

IUCN 기념 숲 및 상징물 조성

❍ 2012제주WCC 개최에 따른 탄소발생량의 상쇄 및 총회 개최를 계기로 환경정책의 상징성을 갖는 기념 숲(공원)조성

❍ 2012제주WCC 개최의 역사적 사실을 기록 기념하는 자연보전 상징물 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ‘12. 2 ~ 11

❍ 사 업 비 : 3,200백만원(국비 1,600  지방비 1,600)

❍ 사업내용

- 기념숲 : 부지정리(100,000㎡), 제주자생종을 이용한 테마 숲, 최소한 공원 시설물 등

- 상징물 : 기념상징물 1식, 소규모 휴게시설 등

□ 추진실적

❍ 기념숲 및 상징물 조성사업 예산 증액 확정(국회) : ‘11. 12

❍ 사업부지 등 관련부서 협의 및 사용 승낙 등 : ‘12. 1 ~ 2

❍ 2012 제주 WCC 상징물 및 공원 조성 입찰 및 협상 : ’12. 3 ~ 5

❍ 2012 제주 WCC 상징물 및 공원조성 설계 및 시공 착공 : ’12. 5. 14

❍ IUCN 기념숲 조성사업 기본 및 실시설계 용역 : ’12. 4 ~ 6

□ 향후계획

❍ 2012 제주 WCC 상징물 및 공원조성 사업 완료 : ’12. 7월말

❍ IUCN 기념 숲 조성사업 발주 : ’12. 7월중

❍ IUCN 기념 숲 조성 기념행사 : ‘12. 9. 13(예정)

WCC 친환경 교통 인프라 구축

❍ 2012 제주 WCC 개최기간 동안 전기자동차 등 친환경 교통 인프라 구축 및 지원

❍ 탄소발생을 최소화한 친환경 이미지 총회로 참가자들에게 각인시킴은 물론, 참가자들의 편의 제공

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ‘12. 2 ~ 9

❍ 사 업 비 : 5,480백만원(국비 2,380  지방비 3,100)

❍ 사업위치 : 제주ICC 및 도 일원

❍ 사업내용

- 전기자동차(경형) 구입 및 충전기 설치

□ 추진실적

❍ 충전기 설치 협약체결 및 사업위탁 : ’12. 6. 15

- 사업비/대행기관 : 880백만원 / 한국환경공단

❍ 전기자동차 구입요구(레이 EV, 100대) : ‘12. 6월

□ 향후계획

❍ 충전기설치 : ‘12. 7 ~ 8월

- 설치장소 : 도 및 사업소 30, 제주시 35, 서귀포시 35

❍ 전기자동차 구입 : ‘12. 8월

- WCC 기간 행사 차량지원 및 행정업무용 사용

도정질문 추진상황

도정질문 추진상황

□ 현  황

(2012. 6. 30현재)

구 분	추 진 상 황					비 고
	계	완 료	추진중	장기과제	추진불가
계	3	1	2			제274회 정례회 제276회 정례회 제281회 임시회 제288회 정례회 제293회 임시회
WCC추진 기 획 단	3	1	2

□ 완료된 사항 (총 1건)

연번	질의일자	질문의원	질 문 내 용
1	2010.12.16	김경진 의원 신관홍 의원 위성곤 의원	○ 세계자연보전총회 관련 예산문제 등 현안 해결 방안

□ 추진중 사항 (총 2건)

연번	질의일자	질문의원	질 문 내 용
1	2011.11.29	현정화 의원	○ 2012 WCC가 지역주민들의 실질적인 소득증대로 이어질 수 있는 대책
2	2012. 4.20	박원철 의원	○ 지역주민 소득 창출 방안 및 세계자연 보전총회 추진상황 등

□ 도정질문 추진상황

도정질문ㆍ답변요지
□ 질문요지 □ 세계자연보전총회 관련 예산문제 등 현안해결 방안 □ 답변요지 □ 기획재정부 예산심사 과정에서 전액 삭감된 WCC 관련 예산을 국회 절충을 통하여 전액 증액지원 합의로 이끌어 냈으나 - 국회 예산안 처리과정이 매끄럽지 못하면서 WCC 관련 2011년도 국비 예산은 운영비 86억원과 WCC 인프라 구축 사업비 79억원 등 총 165억원을 확보하는 데 그침 □ 2011년 사업에 반영되지 않은 IUCN공원조성사업, 회의장 주변 친환경 교통시설 구축은 2012년도에 검토가 가능하다는 답변을 받음 □ WCC는 국가사업이기 때문에 조직위원회와 정부지원위원회, 제주특별자치도가 힘을 합쳐 차질 없이 행사를 개최해 나갈 수 있도록 노력해 나가고자 함
처 리 결 과
□ 2011년 WCC 관련 국비 미확보분 2012년 예산에 반영 확보 □ IUCN 공원조성 : 32억원(국비 16 지방비 16) □ 회의장 주변 전기자동차 교통체계 구축 : 54.8억원(국비 23.8 지방비 31) □ 2012년 WCC 관련 국비 확보 강화 □ WCC 행사장 친환경 개선사업 : 33.3억원(국비 16.65 지방비 16.65) □ WCC 생태문화탐방 인프라 구축사업 : 127억원(국비 63.5 지방비 63.5) □ 친환경 생활공간 조성사업 : 10억원(국비 5 지방비 5) □ WCC연계 세계유기농한식축제 : 6억원(국비 3 지방비 3) □ WCC연계 세계생태관광축제 : 20억원(국비 10 지방비 10)
처리상황	완결 ( ○ ) 추진중 ( ) 추진불가 ( )

도정질문ㆍ답변요지
□ 질문요지 □ 2012 WCC 개최로 3,000억원에 이르는 경제효과가 실질적으로 지역주민의 소득증대로 이어질 수 있는 대책 □ 답변요지 □ WCC 총회 계기 지역주민 소득 증대 및 제주 발전 기반사업 발굴 추진
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 명품 생태문화관광 인프라 구축(‘11.12~’12.9) - 탐방로 조성(51개소), 스토리텔링 개발, 모바일안내시스템 구축 - 전문 직업형 생태문화해설사 양성(400명) - 사업비 : 191억원(국비 95.5 지방비95.5) □ WCC 개최 전후 국내외 관광객 유인대책 마련 - WCC 개최장소 확대 : ICC제주 → 도내 11개 지역 - WCC 기간 연장 : ‘12.9.6~9.15(10일간) → ‘12.8.16~9.15(31일간) - 11개 지역 마을단위 주민 주최 프로그램 마련(워크숍, 전시회, 환경체험 등) - 세계명품생태관광축제, 유기농한식축제 등 신규행사 유치 - 탐라대전, 칠십리축제, 해녀축제 등 기존행사 WCC 연계 추진 □ 지역주민 직접 소득 창출 방안 마련 - 농어촌 민박 활성화를 위한 WCC 참가자 민박 이용 대책 추진 ＊숙박블록 설정시 민박, 펜션 등 포함, 이용객 편의시설 지원 - 마을회관을 방문객안내센터로 조성 지역특산물 등 판매 - 행사대행업체 선정에 지역업체 컨소시엄 참여 : 3개업체(지분 30%) □ 회의산업 기반시설 경쟁력 강화 추진(‘11.11~’12.8) - ICC제주 친환경 회의시설 개선 및 태양광발전시설 설치 - 사업비 : 126.6억원(국비 63.3 지방비 63.3) □ 향후계획 □ WCC 성공개최로 제주의 환경자산 가치를 전 세계에 알려 제주 발전의 원동력이 되는 계기 마련
처리상황	완결 ( ) 추진중 ( ○ ) 추진불가 ( )

도정질문ㆍ답변요지
□ 질문요지 □ 지역주민 소득 창출 방안 및 세계자연보전총회 추진상황 등 □ 답변요지 □ 제주추진지원본부 정기 보고회의 개최, 컨벤션시설 친환경 개선 사업, IUCN 기념공원, 생태문화관광 인프라 구축 사업 등 추진 □ 11개 지역에서 환경대축제를 분산 개최하여 직거래 장터, 특산물 판매, 유기농음식 체험 등 운영, 환경대축제 프로그램 공모 등 도민 참여 강화
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 제주추진지원본부 운영 : 월 1회 정례회의(‘12.2~’12.9) □ 범도민지원위원회 운영 : 워크숍, 결의대회 등 25회 추진(‘10.1~’12.9) □ 생태문화관광 인프라 구축 : 생태문화탐방로 조성, 스토리텔링 개발, 모바일안내시스템 구축, 생태문화해설사 양성(‘11.7～’12.9) □ 컨벤션시설 친환경 개선 추진 : 태양광발전시설(751㎾), 에너지절약형 냉·난방 열원기기 등(‘11.10～’12.9) □ 친환경 교통인프라 구축 : 전기자동차(100대) 및 충전인프라(‘12.3～’12.9) □ 친환경 방문객 지원시설 조성 : 32개소(‘12.2～’12.9) □ IUCN 기념 숲 및 WCC 상징물 조성(‘12.2～’12.9) □ 세계지방정부정상포럼 개최(9.4～9.6) □ 워크숍(5), 지식카페(2), 포스터(8), 제주 파빌리온 등 제주 주관 프로그램 운영(9.6~9.15) □ 세계환경수도 등 제주형발의안(5건) IUCN 회원총회 채택 추진(‘11.11~’12.9) □ 환경대축제 개최 : 11개지역에서 워크숍, 전시회, 교육․체험 등 5백여개 프로그램 운영(8.16～9.15) □ 향후계획 □ 2012 제주 WCC 환경대축제 개최(8.16～9.15) □ 2012 제주 WCC 개최(9.6～9.15)
처리상황	완결 ( ) 추진중 ( ○ ) 추진불가 ( )

2011년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2011년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2012. 6. 30현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	2		2
WCC추진기획단	2		2

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ WCC 사업 추진 철저	추진중
2	○ 생태문화탐방로 조성 사업내용 및 소요예산 등 사전협의	추진중

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항
□ WCC 추진관련 예산이 행사기간 1년도 안남은 현시점에서 10월말 현재 집행실적이 부진하며, 국가적인 행사인데 지방비 매칭비율이 너무 많아, 국비지원 비율을 높이는 노력과 사업추진이 부진하여 제대로 행사추진이 될지 우려되는데 추진에 철저를 기하기 바람
처 리 결 과
□ 예산집행현황(‘11. 10. 30현재) □ WCC추진단 예산액 16,377백만원중 6,266백만원 집행(집행율 38.3%) □ 부진사업 - WCC 행사장 친환경 개선사업 : 3,330백만원 - 스토리텔링 개발 및 모바일안내시스템 구축 : 1,500백만원 - 생태문화탐방로 조성 : 4,900백만원 □ 추진상황 □ WCC 행사장 친환경 개선사업 : 3,330백만원(‘11.11~’12.8) □ 스토리텔링 개발 용역 : 853백만원(‘11.12~’12.9) □ 모바일안내시스템 구축 용역 : 473.5백만원(‘11.12~’12.8) □ 생태문화탐방로 조성사업 실시설계 용역 : 172.9백만원(‘11.12~’12.2) □ 생태문화탐방로 조성공사 : 4,727.1백만원(‘12.4 ~ ’12.8) □ 향후계획 □ WCC 행사전 인프라 조성 사업 완료(‘12.7~9)
처리상황	완결 ( ) 추진중 ( ○ ) 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 생태문화탐방 인프라 구축사업 50개소 180개 포인트의 내용이 현실적이지 못한 면이 있으므로 충분히 검토하여 시행할 것이며, 사업내용이나 소요예산 등 의회와 사전 협의하여 추진하기 바람
처 리 결 과
□ 사업개요 □ 사업기간 : 2011. 7 ~ 2012. 9 □ 총사업비 : 16,955백만원(2011년 4,900 2012년 12,055) □ 사업내용 : 2012제주WCC 생태문화탐방로 51개 코스 조성 □ 추진상황 □ ‘11. 6 : 지역주민 의견수렴 및 사업계획 검토 □ ‘11. 12. 9 : 생태탐방로 기초조사 및 스토리텔링 개발 사업 착수 □ ‘11. 12. 27 : 생태탐방로 실시설계용역 착수(서귀포시 지역) □ ‘12. 1. 27 : 생태탐방로 선정 대상지 대주민 설명회 □ ‘12. 4. 3 : 서귀포시지역(54개소) 생태문화탐방로 조성사업 추진 □ ‘12. 5. 15 : 생태문화탐방로 조성사업 추진부서 보고회 □ ‘12. 6. 4 : ’12년도분 생태문화탐방로 조성사업 실시설계 완료 □ ‘12. 6 : 생태문화탐방로 실시설계 용역보고서 원가심사 □ 향후계획 □ ‘12. 7월중 : ’12년도분 생태문화탐방로 조성사업 착수 □ ‘12. 8~9월중 : ’11~‘12년도분 생태문화탐방로 조성사업 완료
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )