제297회 제주특별자치도의회제1차정례회

문화관광위원회

2012.  7.   .

주 요 업 무 보 고

전국체전기획단

순      서

□		일 반 현 황
□		2012년 업무 계획
	❍		2014년 제95회 전국체전의 완벽한 준비
	❍		본격적인 경기장 확충사업 추진
	❍		지역의 가치 극대화에 중점을 둔 테마있는 체전준비
□		도정질문 후속조치 추진 상황
□		2011 행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

일  반  현  황

□ 기구 및 정․현원

기구(1단․2팀)

			전국체전기획단
	총괄팀					시설팀

현   원(5명)

구 분	계	일 반 직				기능직
		소계	3급	5급	6급
계	5	4	1	0	3	1
총 괄 팀	4	2	1		2	1
시 설 팀	1	1			1	(무기1)

□ 주 요 기 능

□ 제95회 전국체전 기본계획 및 세부 실천계획 수립 및 추진

□ 지방재정 투자계획에 따른 대중앙 절충 등 예산 확보

□ 제95회 전국체전 대비 경기장 신설․보수․보강 및 공인․승인절차 이행

□ 대회기구(조직위원회․집행위원회)설치 및 운영

2012년 주요업무 계획

2014년 제95회 전국체전의 완벽한 준비

□ 전국제전의 성공적인 개최를 위한 단계별 프로그램을 마련하여 완벽한 체전 준비

□ 대회 개요

❍ 명    칭 : 제95회 전국체육대회    ※1998년, 2002년 개최(2회)

❍ 개최시기(예정) : 2014. 10월중(7일간)

❍ 주최/주관 : 대한체육회/제주특별자치도·교육청·체육회

❍ 경기종목 : 46개종목(공식 42, 시범 3, 전시 1)

□ 예산액 : 1,036억원(시설 806, 운영 230)※국비 276, 도비 760

□ 지금까지 추진 상황

❍ 2009. 12. 28 제95회 전국체전 제주유치 확정

❍ 종합경기장(주경기장 등 6개소) 정밀안전진단 용역 실시

⇒ 안전진단결과 : 종합C등급판정(구조적 위해요소 없으나 손상부분 보수 필요)

❍ 경기장 보수보강 기본계획(36개소) 수립

❍ 2014년 제95회 전국체전 준비 단계별 추진계획 수립

❍ 전국체전시설 건립사업 소요예산 국비 절충 및 확보

- 2012년도 8개 사업 : 국비98억, 2013년도 8개사업 : 국비 93억

□ 하반기 추진 계획

❍ 종목별 경기장 배치 및 경기용품 수급계획 수립

❍ 2013년도 시설예산 국비 절충 강화(기획재정부, 국회 등)

❍ 2012년도 예산중 지방비 미확보분(95억)에 대한 추경예산시 확보

❍ 기본계획(안) 수립 및 대회조직위원회, 집행위원회 구성 준비

❍ 대회지원을 위한 부서별 업무협의 및 워크숍 개최

본격적인 경기장 확충사업 추진

❍ 단계별 경기장 신축 및 보수보강 계획에 따른 사업시행으로  체전의 완벽한 수행과 선수 등 사용자의 안전성 확보

❍ 사후 국내외 경기 및 전지훈련단 유치 등 활용계획을 수립하여 재정투자의 효과 거양 및 생활체육의 활성화

□ 단계별 연도별 공사추진 계획

<제1단계> : 2012~2013년

❍ 2012년도 : 예산 327억원(국고 98억, 도비 229억) ※ 미확보 95억

- 신설경기장 신축 : 3개소

․제주복합체육관, 서귀포 실내전지훈련센터

제주대학교 승마경기장

- 기존경기장 보수․보강 및 리모델링 공사 5개소

․종합경기장 주경기장, 실내수영장, 한라체육관, 야구장

도체육회관(다목적체육관)

❍ 2013년도 : 예산 310억원(국고 93억, 도비 217억)

- 신설경기장 신축(계속사업)  : 3개소

- 기존경기장 보수․보강 및 리모델링 공사(계속사업) :  5개소

- 애향운동장, 연정정구장 보수보강 44억(국13, 도31) ※신규사업 국비확정

<제2단계> : 2014년

❍ 2014년도 : 예산 170억원(국고 51억, 도비 119억)

- 읍면동 체육시설 등 소규모 보수 보강

- 각종 경기장시설 경기용품 수급 및 공ㆍ승인 완료

※ 2011년 경기체전시 예산1,975억원 투입하여 생산유발 5,076억원,

고용유발효과 10,563명 창출(경기개발연구원 분석자료)

지역의 가치 극대화에 중점을 둔 테마있는 체전준비

❍ 말산업 특구 지정 등 독특한 문화, 청정한 자연환경 등 제주적 이미지를 극대화하여 창조적이고 차별화된 체전으로 승화

□ 테마별 추진 계획

❍ 제주대학교 종합승마타운 건립과 연계한 승마경기장 지원(‘12~’13)

- 총사업비 30억(국9, 도21) *‘12년도 예산 10억(국3, 도7)보조

❍ 폴로경기를 2014년 전국체육대회 전시종목 채택

※대한체육회 및 도체육회와 전시종목 신청 지정 협의(‘11.11.6)

⇒ 전국 유일의 폴로경기장을 활용하여 전시종목으로 운영함으로써 색다른 볼거리 등 고부가가치 관광레저스포츠 개발

❍ 아름다운 제주의 바다풍경을 아우를 요트경기 활성화

- 요트관련 시설 보강 등 요트에 대한 관심 제고 및 홍보방안 마련

□ 향후 계획

❍ 경기장 외에서 개최되는 사이클, 마라톤, 경보경기 등 경기코스를 제주의 특성이 잘 드러날 수 있는 곳으로 선정

❍ 경기장 시설 확충시 제주성이 가미된 특색있는 시공 추진

❍ 제주를 함축적으로 표현한 전국체전 상징물 공모

- 엠블럼, 마스코트, 포스터, 슬로건(구호, 표어)

❍ 탐라대전 등 지역 내 상징성 있는 이벤트와, UNESCO 자연분야 3관왕 및 세계7대자연경관 선정과 최대한 연계하여 독특한 문화와 가치를 활용 상품화 방안 마련

❍ 세계자연유산 거문오름탐방, 올레길 걷기등 전국체전 선수 및 가족이 보고, 느끼고, 참여하는 체험형 대회로 연출

도정질문 후속조치 추진상황

도정질문 후속조치 추진상황

□ 현 황

(2012.  6. 30현재)

구 분	추 진 상 황					비 고
	계	완료	추진중	장기과제	추진불가
계
전국체전 기 획 단		해당	사항	없음

2011년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2011년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2012.  6. 30현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
전국체전 기획단	1	1	-	-

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	❍ 종합경기장 정비시 중장비가 진입할 수 있도록 출입문을 정비하는 방안을 강구하기 바람	추진중

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 전국체전기획단 (☎) 6562
1. 종합경기장 정비시 중장비가 진입할 수 있도록 출입문을 정비하는 방안을 강구하기 바람
처 리 결 과
□ 사업개요 □ 종합경기장 주경기장 보강공사 • 대지위치 : 제주시 서광로 2길 24(오라일동) • 사업기간 : 2012. 1. ~ 2013. 12. • 총사업비 : 150억원(국[기금] 45, 도비 105) * 2012년도 85억원(국[기금] 45, 도비 40) • 준공년도 : 1968년(1차 증축 1980년, 2차 증축 1984년) • 규 모 : 연면적 37,476㎡, 트랙 8레인, 수용인원 25,000명 □ 추진상황 □ 2011. 2. 17 : 종합경기장 정밀안전진단 용역 완료 □ 2011. 3. 29 : 지방재정투융자심사 완료 □ 2011. 4. 4 ~ 9. 30 기본 및 실시설계 수행 □ 향후계획 □ 2012. 10. ~ 각종 행정절차 이행 □ 2012. 12. ~ 2013. 12. : 주경기장 보강공사 실시 □ 조치계획 □ 주경기장 보수공사시 출입문 바닥커팅 또는 상부커팅 등을 통하여 중장비가 원활히 진입할 수 있도록 조치하겠음
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )