2012년도 공유재산관리계획 변경(안)

( 2014년도 전국체전대비 복합체육관 신축사항 변경)

2012년도 공유재산관리계획 변경(안)

( 2014년도 전국체전대비 복합체육관 신축사항 변경)

의안 번호	879	제출일자 : 2012년 12 월 일 제 출 자 : 제주특별자치도지사

1. 제안이유

❍ 2014년 제95회 전국체육대회 대회를 대비하여 제주종합경기장내 기존 게이트볼장을 철거 후 배드민턴경기장, 역도경기장, 게이트볼장, 스쿼시경기장, 체력단련장 등을 겸비한 제주복합체육관을   신축하여 성공적인 체전개최는 물론 노후화되고 부족한 제주종합경기장에 대한 보완적 차원의 복합체육시설이 가능한 경기장으로 건립코자 2011년12월16일 제288회 제주특별자치도의회 제2차정례회 제4차 본회의에서2014년도 전국체전대비 복합체육관 신축 안으로 의결 받았으나

❍ 일반 건물은 지하층 공사를 하려면 5미터 정도면 가능하나 체육 경기장(특히 스쿼시장)을 지하에 신설하려면 10미터 이상 터파기 공사가 필요하여, 지상층보다 1.5배 정도의 공사비와 공사기간이 추가 부담등 지하층 신축이 어렵고

※특히 지하 역도장은 부상우려로 선수들이 사용 기피하며

시공시 암반지형에 따른 터파기, 발파, 토사 수송에 따른 민원 발생이 우려됨

❍ 2014년 전국체전 체조경기는 한라체육관을 주경기장으로 활용할 계획이나, 이에 따른 체조보조 경기장이 없어, 신축이 불가피하여

❍재정여건 등을 고려 기존 체육회관을 리모델링하여 1층은 역도장, 스쿼시장, 레슬링 등을 시설하고 2층은 체조보조경기장을 증축하여  기존시설의 활용도와 재정투자의 효율성을 높이고자 당초 지하층에 시설 하기로한 역도경기장 스쿼시경기장, 체력단련장 시설계획을 변경하고자 하는 내용으로서

❍ 지방자치법제39조제1항 제6호 ,공유재산 및물품관리법 제10조 및 동법시행령 제7조, 공유재산관리조례 제10조의 규정에 의거 2012년도 공유재산관리계획변경(안)에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

❍ 소 재 지 : 제주시 오라1동 1006번지 일원

❍ 부지면적 : 4,983㎡ (종합경기장내 게이트볼장 철거후 신축)

❍ 면    적 : 연면적 8,900㎡ (기존 게이트볼장 4,513.67㎡, 8코트)

❍ 규    모 : 지하1층, 지상2층

❍ 사업기간 : 2012. 1월 ~ 2013. 12월 (2개년)

❍ 사 업 비 : 15,000백만원 (국비 4,500  도비 10,500)

❍ 사업주관 : 제주특별자치도 전국체전기획단 (도 스포츠산업과)

❍ 주요시설 : 배드민턴경기장, 게이트볼장

❍ 주요 변경사항

내 용	변경전	변경후	비고
위 치	구 게이트볼장	좌동	철거
연 면 적	11,700㎡	8,900㎡	Δ2,800㎡
체육시설	2 층 : 배드민턴 1 층 : 게이트볼 지층 : 역도,스쿼시, 체력단련실, 기계실	2 층 : 배드민턴 1 층 : 게이트볼 지층 : 기계실	역도, 스쿼시는 도체육회관에 시설하고 체력단련실은 주경기장에 시설
사 업 비	250억원	150억원	Δ100억원

3. 기대효과

❍ 전국체전 부족경기장 시설확충을 통한 2014년도 전국체전 성공적인 개최

❍ 종합경기장을 전지훈련의 메카로 조성, 엘리트 체육선수단을 유치하여 도민의 소득을 증대시키고, 주민편의 시설 및 생활체육 공간으로 활용하여 스포츠 인구의 저변확대

4. 공유재산관리계획서 : 별지와 같음

5. 참고자료

❍ 사업계획서 : 별첨

❍ 위치도 및 현장사진

공유재산관리계획서

제주특별자치도

공 유 재 산 관 리 계 획 서

(단위 : ㎡, 천원)

구 분			상 반 기			하 반 기			합 계			비고
			건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액	건 수	면 적	금 액
취득	계	토 지 건 물 기 타				1	8,900	15,000,000	1	8,900	15,000,000	기 존 동의안 면적: 11,700㎡ 금액: 25,000, 000천원
	매입	토 지 건 물 기 타
	기 타 취 득	토 지 건 물 기 타				1	8,900	15,000,000	1	8,900	15,000,000
처분	계	토 지 건 물 기 타
	매 각 (멸실)	토 지 건 물 기 타
사용 및 대부		토 지 건 물 기 타

2012년 취득대상 재산 목록

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	재 산 의 표 시			추정 가격	취득 시기	취득사유	취득재산 소유자와 주소, 성명	비고
	지목 (구조)	소 재 지	면적
1	건물	제주시 오라1동 1006	8,900	15,000,000	2013 상반기	2014년 전국체전대비 부족경기장 시설물 신축	건물신축 제주특별자치도

제주복합체육관 신축공사

❍ 2014년 전국체전 개최에 대비하여 공인규정에 맞는 배드민턴 경기장 건립

․향후 국내외 경기 유치 및 종합경기장내 스포츠시설 인프라 확충

▶ 지상2층 : 배드민턴경기장 12코트 조성

▶ 지상1층 : 게이트볼장 8면

□ 사 업 개 요

ㅇ 위    치 : 제주시 오라1동 1006번지 일원

ㅇ 규    모 : 연면적 8,900㎡ (지상2층)

ㅇ 주요시설 : 배드민턴경기장, 게이트볼장

ㅇ 사업기간 : 2012. 1월 ~ 2013. 12월(2개년)

ㅇ 사업주관 : 제주특별자치도 전국체전기획단(스포츠산업과)

□ 사업예산 확보계획

(단위:백만원)

구분	계				2011년				2012년				2013년 이후
	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타	계	국비	도비	기타
제주 복합 체육관	15,000	4,500	10,500	-	-	-	-	-	2,500	750	1,750	-	12,500	3,750	8,750	-

□ 기대효과

ㅇ 전국체전대비 경기장 시설확충을 통한 2014 전국체전 성공적인 개최

ㅇ 노후화된 종합경기장내 보완적 경기장을 건립하여 종합경기장 면모일신

ㅇ 종합경기장내 다양한 스포츠 인프라 구축을 통한 스포츠산업 활성화 및 주민이용 편의시설 확대

사 진 대 장

위  치  도

현 장 사 진