제303회 제주특별자치도의회임시회

문 화 관 광 위 원 회

2013. 2.

주 요 업 무 보 고

전국체전기획단

순    서

Ⅰ. 정책방향 및 목표

Ⅱ. 일반현황

Ⅲ. 2013년 주요업무계획

ꏅ 전국체전 예산현황 및 2014 국비확보 계획

ꏅ 본격적인 전국체전 추진 조직체계 구축

ꏅ 성공적 체전을 위한 운영준비 계획

ꏅ 전국체전 주요 경기장의 확충사업 마무리

ꏅ 전국체전 경기장 배정 계획

Ⅳ. MOU체결 추진상황

Ⅴ. 도정질문 추진상황

Ⅵ. 2012년 행정사무감사 지적사항 처리결과

정책방향 및 목표

		2013년 정책방향 및 목표

1		주요 국내·외 스포츠 대회

1. 국제개최 대회

□ 브라질월드컵 : 2014. 6. 12 ~ 7. 13

□ 제2회 하계유스올림픽 (중국난징) : 2014. 8. 16 ~ 8. 28

□ 제22회 동계올림픽 (러시아 소치) : 2014. 2.  7 ~ 2. 23

2. 국내개최 대회

□ 제10회 평창 동계스페셜올림픽 : 2013. 1. 29 ~ 2. 5

□ 인천아시안게임  : 2014. 9. 19 ~ 10. 4(16일간)

□ F1 그랑프리 대회 : 2014. 10. 중순

2		정책방향 및 목표

도민이 행복한 국제자유도시

2014 제주 전국체전 성공신화를 만들겠습니다.

목표 1.주요 경기장 10개소의 확충사업을 마무리하겠습니다.

2.전국체전의 성공을 이루는 조직체계를 본격 가동하겠습니다.

3.경기장 시설․운영에 필요한 국비예산 확보에 전력을 다하겠습니다.

일   반   현   황

		일 반 현 황

ꏚ 기구 및 정․현원

❍ 기    구

			전국체전기획단장
			총 괄 과 장
체전기획담당			체전운영담당			체전시설담당

❍ 정․현원

구 분	계	일 반 직							기능직
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급
정 원	12	11	1	1	3	3	2	1	1
현 원	12	10	1	0	4	2	2	1	2

ꏚ 주 요 기 능

❍ 제95회 전국체전 기본계획 수립 등 전국체전 개최에 관한 사항

❍ 전국체전 조직위원회, 집행위원회, 지원위원회 등 구성 운영

❍ 전국체전 경기장 배정 및 상징물 개발, 홍보

❍ 경기장 일제조사 및 시설이용, 확충․보수계획 수립 등 추진

❍ 전국체전 평가분석 및 백서 발간 등

2013년 주요업무계획

전국체전 예산현황 및 2014 국비확보 계획

1. 제95회 전국체전 개요

□ 개최시기 : 2014. 10월말~11월(예정) ※인천아시안게임(10. 4 폐막)

□ 경기종목 : 48개 종목(공식 44, 시범 3, 전시 1), 80개 경기장

□ 참가예상인원 : 28,000여명(선수 20,000, 임원 8,000)

2. 경기장시설 등 투자계획

□ 총투자계획 : 1,036억원 (국비 184, 기금 93, 특교세 80, 도비 679)

(단위 : 억원)

시 설 명		계			2012년도			2013년도			2014년도
		계	국고	도비	계	국고	도비	계	국고	도비	계	국고	도비
합계(시설비+운영비)		1,036	277	759	327	98	229	274	82	192	435	97	338
시설비 소계		806	242	564	327	98	229	272	82	190	207	62	145
	일반회계 (제주복합체육관․서귀포 다목적체육관 신축, 한라체육관, 야구장 보강 등)	582	175	407	167	50	117	207	62	145	207	62	145
	기 금 (주경기장․애향운동장 ․연정구장 보강)	194	58	136	150	45	105	44	13	31
	광역지역발전특별회계 (승마경기장건립)	30	9	21	10	3	7	20	6	14	-	-	-
운 영 비 (국민체육진흥기금)		230	35	195				2		2	228	35	193

3. 2014 국비확보 계획 : 97억원  ＊기금 및 광특 최대 활용

❍ 경기장 보수보강 사업 : 50개소 207억원(국비 62, 도비 145)

∙읍․면․동 체육시설 보강 : 49개소 170억원(국비 51, 도비 119)

∙종합경기장내 야구장 보강(계속사업) : 37억원(국비 11, 도비 26)

❍ 대회운영비 : 228억원(기금 35, 도비 193)

본격적인 전국체전 추진 조직체계 구축

❍ 2014년 제95회 전국체육대회의 성공적인 개최를 뒷받침하기 위한 조직위원회 등 구성․운영

❍ 체육계 등 관련 유관단체와의 협조체제 공조로 체전준비에 내실을 기하고자 함

ꏅ 추진계획

❍ 전국체육대회 조직위원회 구성․운영

∙운영기간 : 2013. 4 ~ 2015. 소년체전 종료시

∙주요기능 : 전국체육대회 주관 및 정책 자문

∙위촉대상 : 의회, 교육계, 행정시, 체육계, 언론기관, 문화예술,

경제, 금융기관, 사회단체, 지역인사 등 100여명

❍ 전국체육대회 집행위원회 구성․운영

∙운영기간 : 2013. 4 ~ 2015. 소년체전 종료시

∙주요기능 : 전국체육대회 실질 운영, 대회지원, 경호, 환경정비 등

∙위촉대상 : 도, 교육청, 체육회, 경찰청, 행정시 관련 부서장

❍ 전국체육대회 지원위원회 구성․운영

∙운영기간 : 2013. 9 ~ 2015. 소년체전 종료시

∙주요기능 : 시민운동, 봉사활동, 자매결연 등 서포터즈 활동

∙위촉대상 : 읍․면․동 지역인사, 봉사단체, 가맹경기단체, 문화예술, 관광업, 기업체, 숙박,  음식업, 의․약협, 대중교통단체 등

ꏅ 기대효과

❍ 국회의원, 도의원 등 기관단체 및 봉사단체, 읍·면·동 지역인사참여, 구성·운영으로 도민이 행복한 융합체전으로 승화

성공적 체전을 위한 운영준비 계획

❍ 2014년 제95회 전국체전의 성공적 개최를 위하여 대회종합계획 수립 등 단계별 로드맵 추진으로 성공체전 개최

ꏅ 추진계획

❍ 전국체전 종합사업계획 수립

∙추진체계 구축, 종합상황실 운영, 개·폐회식, 성화봉송, 홍보, 경기장 운영, 의전, 자원봉사, 교통 등 망라 수립

∙교육청, 체육회, 행정시 합동워크숍 : 2013. 2월중

∙조직위원회 심사(4월)후 대한체육회 승인 : 2013. 8월중

❍ 전국체전 대회상징물 공모 및 매뉴얼 제작

∙엠블렘, 마스코트, 포스터 등 (5월 ~ 10월 완료)

❍ 전국체전 홈페이지 구축 등 운영

∙대회정보, 경기기록, 역대대회, 제주홍보란 등 (12월 개통)

❍ 전국체육대회기 인수행사 추진

∙대회기 인수식(인천시장-대한체육회장-제주특별자치도지사)

∙제주 전국체전 홍보물 상영, 무용단 공연 (10월 17일)

❍ 개·폐회식의 기본 아이템 설정

∙제주의 청정 자연환경, 독특한 문화 등 제주 미래가치 및 국제자유도시 비전 제시

∙연예인 초청 자제 및 실질적인 도민 체감행사로 도민의 자긍심을

높일 수 있는 콘텐츠 개발 (고교생 카드섹션, 7천명 합창제 등)

ꏅ 기대효과

❍ 제주의 가치와 자원을 담은 특색있는 체전으로 승화시켜 제주의 위상 제고 및 제주인의 자긍심 고취

전국체전 주요 경기장의 확충사업 마무리

❍ 단계별 경기장 확충사업의 철저한 시행을 통해 체전의 완벽한 준비 및 스포츠산업의 기반시설 마련

❍ 사후 활용도의 마련으로 재정투자의 승수 효과 거양 및 내수

경기 부양에 기여

- 10개소 636억원 -

1. 제주복합체육관 신축

❍ 총사업비 : 150억원 (국비45, 도비105)

❍ 주요시설 : 1층 게이트볼장 8면, 2층 배드민턴장 12면

❍ 추진상황 : 설계완료, 2013. 2월 발주, 2014. 2월말 준공

※ 향후 생활체육 활성화에 기여

2. 서귀포다목적체육관 신축

❍ 총사업비 : 39억원 (국비12, 도비27)

❍ 주요시설 : 핸드볼 경기장 규모(50m×30m) 관중석 400석 내외

❍ 추진상황 : 설계완료, 2013. 2월 발주, 2013. 12월말 준공

※ 2층 트랙 설치로 전천후 전지훈련장으로 활용

3. 승마경기장 건립

❍ 총사업비 : 30억원 (국비9, 도비21)

❍ 주요시설 : 실외주경기장, 실내마장, 연습마장, 마방

❍ 추진상황 : 설계완료, 2012. 12월 착공, 2014. 2월말 준공

※ 제주대학교 종합승마타운 조성 계획 연계추진

4. 종합경기장 주경기장 보수·보강

❍ 총사업비 : 150억원 (국비45, 도비105)

❍ 보강계획 : 본부석 증축, 전광판, 트랙, 내부 리모델링

❍ 추진상황 : 설계완료, 2013. 2월 발주, 2013. 12월말 준공

※ 엘리트 체육인 육성 및 전지훈련 센터 조성

5. 한라체육관 보수·보강

❍ 총사업비 : 53억원 (국비16, 도비37)

❍ 사업내용 : 지붕 방수, 마루 교체, 내·외부 도색, 리모델링

❍ 추진상황 : 설계 완료, 2013. 2월 발주, 2013. 12월말 준공

6. 실내수영장 보수·보강

❍ 총사업비 : 65억원 (국비20, 도비45)

❍ 보강내역 : 풀장, 다이빙장 정비, 구조체 균열 등 보수·보강

❍ 추진상황 : 설계완료, 2013. 3월 발주, 2013. 12월말 준공

7. 야구장 보수·보강

❍ 총사업비 : 60억원 (국비18, 도비42)

❍ 보강내역 : 캐노피, 스탠드 보강, 지붕 방수, 인조잔디 교체

❍ 추진상황 : 설계 완료,  2013. 6월 발주, 2014. 6월말 준공

※ 2014년도 예산 추가 확보액 : 37억원(국비 11, 도비 26)

8. 애향운동장 보수·보강

❍ 총사업비 : 24억원 (국비7, 도비17)

❍ 보강내역 : 천연잔디 교체, 우레탄 트랙 교체, 비가림 시설 보수

❍ 추진계획 : 2013. 4월말 설계 완료, 6월 발주, 2013. 12월말 준공

9. 종합경기장 연정정구장 보수·보강

❍ 총사업비 : 20억원 (국비6, 도비14)

❍ 보강내역 : 테니스장 면수 증설(8면⇒10면), 우레탄 바닥 교체

❍ 추진계획 : 2013. 4월말 설계 완료, 6월 발주, 2013. 12월말 준공

10. 도체육회관 다목적체육관 증축

❍ 총사업비 : 45억원 (국비13, 도비32)

❍ 증축내역 : 역도경기장, 스쿼시장, 체조보조경기장 증축

❍ 추진상황 : 설계완료, 2013. 2월 발주, 2013. 12월말 준공

전국체전 경기장 배정 계획

❍ 2014 제주 전국체전을 대비하여 종목별 경기장 배정기준을마련하고 소규모 시설 정비 및 경기용 기구마련 등 성공적 체전 토대 마련

ꏅ 경기장 배정 기준

❍ 경기장 신설 최소화, 기존 경기장을 최대한 보수보강 활용

❍ 읍․면지역 1종목 이상 배정, 제주도민 참여축제로 승화

ꏅ 종목별 경기장 배정 및 시뮬레이션 운영

❍ 종합경기장 주경기장 : 육상 및 개·폐회식 장소로 운영

❍ 종목별 경기장 배정은 지역 안배 및 공공체육시설 활용 극대화

∙종합경기장 : 육상, 수영 등 10개 경기장

∙제주시지역(학교 포함) : 한림체육관(씨름) 등 20개 경기장

∙서귀포지역 : 효돈체육관(배구) 등 30개 경기장

∙기타 도로, 바다, 오름 등 제주도 일원 : 9개 경기장

❍ 타시도 임차 : 사이클, 사격, 하키, 조정, 카누, 근대5종(승마) 6개 경기장

❍ 도내 민간시설 임차 : 골프, 스쿼시, 볼링(4개소) 6개 경기장

❍ 도민체전, 종별 전국대회시 심판 및 경기운영 시뮬레이션 실시

ꏅ 경기장 공․승인(정식 종목) : 2014. 7월 한

❍ 공인 : 육상 등 11개 종목,  ❍ 사용승인 : 축구 등 32개 종목

ꏅ 전국체전 종목별 경기기구 확보

❍ 체조종목 등 일부 경기 종목의 기구는 외국산 등 확보 필요

※ 소요예산 50억원 중 일부는 1회 추경시 반영

ꏅ 기대효과

❍ 읍․면지역 1종목 이상 배정, 전도민 참여축제로 승화

❍ 올레 걷기, 농어촌 마을 체험 프로그램 등과 연계, 지역 소득 창출과 도민행복 체감도 제고

MOU체결 추진상황

승마경기장 조성사업 MOU체결 추진상황

❍ 제주대학교에서 추진하고 있는 종합승마타운 조성사업과 연계한 2014년 전국체전대비 승마경기장 신설 사업 보조

❍ 말산업특구 지정 등 말산업의 발전 기반 조성 및 경쟁력 강화

ꏅ 사업개요

❍ 위    치 : 제주시 아라동 6-27 (제주대 목장부지)

❍ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2014. 4.

❍ 지원사업비 : 30억원(‘12년 10, 13년 20)  ＊총사업비 : 45억원

❍ 주요시설 : 주경기장(80×60m), 연습마장, 마방

ꏅ MOU체결 주요내용

❍ 제주대학교는 도에서 30억원을 보조받아 전국체전에 맞는 공인규격(부대시설 포함)으로 시설

❍ 시설운영은 제주대학교에서 하고, 도지사가 요청하는 각종 대회 및 공공목적의 사용시에는 사용료 면제

❍ 운영자는 승마인구 저변 확대 및 다양한 공익프로그램 마련 등

ꏅ 추진상황

❍ MOU 체결일자 : 2012. 4. 4

❍ 기본 및 실시설계 완료 : 2012. 10. 30

❍ 공사착공 : 2012. 12. 17

ꏅ 앞으로 계획

❍ 승마경기장, 실내 연습마장, 마사동, 연구소 등 준공 : 2014. 2월

❍ 대한체육회 공인 신청 및 완료 : 2014. 4월

도정질문 추진상황

- 해 당 사 항 없 음 -

2012년 행정사무감사 지적사항 처리결과

- 해 당 사 항 없 음 -