제314회 제주특별자치도의회임시회

문 화 관 광 위 원 회

2014.  2.

주 요 업 무 보 고

전국체전기획단

순      서

□		비전 및 전략목표
□		일 반 현 황
□		2014년 주요업무계획
	❍		제95회 전국체육대회 개요
	❍		도민참여 극대화로 만족, 감동체전 운영
	❍		전국체전 종합운영 시스템 구축운영
	❍		체전분위기 조성을 위한 단계적 대회홍보
	❍		성공체전 기원과 화합을 위한 성화봉송
	❍		경기력 향상을 위한 경기용기구 확보
	❍		체전경기장 확충사업 역점추진
	❍		경기장 종목별 공인․사용승인 추진
	❍		경기장 시설 유지관리 및 안전체계 구축운영
	❍		「감동․환희」의 개․폐회식 공개행사 추진
□		도정질문 추진상황
□		2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

비전 및 전략목표

비전 및 전략목표

비 전		도민이 행복한 국제자유도시

목 표		스포츠, 문화, 환경이 조화된 융복합 체전

전략과제		실행계획
경제+문화+환경+화합체전 운영		① 제주공연자원 적극 활용 ▶제주 문화자원 총결집 공연참여 기회확대 ② 환경자원 가치 극대화 ▶세계7대자연경관 등 활용 체험프로그램 마련 ③ 지역경제 활성화 기여 ▶전통시장, 지역특산물, 향토음식 등 홍보판매 전시장 운영 등
경기장 확충과 대회운영의 완벽한 준비		① 주요경기장(10개소) 확충 및 소규모체육시설(35개소) 보수보강 ▶생활체육 활성화 등 사후 활용도 제고 ② 인프라시설 확충, 스포츠산업 기반마련 ▶엘리트 선수육성, 전지훈련 등 유치확대 기반조성 ③ 경기장 공승인 및 종목별 경기기구 확보 ▶시설규격 및 종목별 경기력 향상 경기기구 확보
도민 역량 결집, 감동체전 실현		① 도민의 자긍심 고취 ▶개․폐회식행사 등 적극적인 도민참여 프로그램 개발 ② 공감과 감동문화 조성 ▶선수단+단체 등 자매결연 및 자원봉사 활성화 ③ 국민통합 및 해외동포와 교류확대

일   반   현   황

일반현황

1		기구 및 정·현원

❍ 기    구

						전국체전기획단장
						총 괄 과 장
체전기획담당				체전운영담당						체전시설담당						체전행사지원담당

❍ 정․현원

구 분	일 반 직							비 고
	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급
정 원	13	1	1	3	3	4	1
현 원	14	-	1	4	4	5	-
과부족	1	△1	-	1	1	1	△1

＊무기계약직 : 1명

2		주요기능

❍ 전국체전 기본계획 수립 등 체전개최에 관한 사항

❍ 조직위원회, 집행위원회, 지원위원회 등 구성 운영

❍ 전국체전 경기장 배정 및 상징물 개발, 홍보

❍ 경기장 일제조사 및 시설이용, 확충․보수계획 수립 등 추진

❍ 전국체전 평가분석 및 백서 발간 등

2014년 주요업무계획

제95회 전국체육대회 개요

□ 개    요

❍ 개최기간 : 10. 28(화) ~ 11. 3(월)

＊장애인아시아경기대회(APG) 일정과 일부중복 변경 【당초 10.21(화)~10.27(월)】

❍ 경기종별 : 고등부, 대학부, 일반부, 해외동포부

❍ 경기종목 : 46개종목(공식 44, 시범 2), 72개 경기장

*도외개최(4종목) : 사이클, 사격, 조정, 근대5종(승마)

❍ 참가인원 : 30,000여명(17개 시․도 및 이북5도, 해외동포 선수단)

❍ 주최/주관/후원 : 대한체육회/제주특별자치도, 교육청, 체육회/문체부

□ 투자계획

(단위 : 억원)

재원	시 설 명	계			2012년도			2013년도			2014년도
		계	국고	도비	계	국고	도비	계	국고	도비	계	국고	도비
합계(시설비+운영비)		998	273	725	327	98	229	279	82	197	392	93	299
시설비합계		800	238	562	327	98	229	277	82	195	196	58	138
일반회계	소 계	380	113	267	167	50	117	213	63	150	-	-	-
	제주복합체육관 신축	150	44	106	25	7	18	125	37	88	-	-	-
	서귀포 다목적체육관 신축	39	12	27	37	11	26	2	1	1	-	-	-
	실내수영장 보강	65	20	45	20	6	14	45	14	31	-	-	-
	한라체육관 보강	53	16	37	20	6	14	33	10	23	-	-	-
	야구장 보강	23	7	16	20	6	14	3	1	2	-	-	-
	도체육회관증축	45	14	31	45	14	31	-	-	-	-	-	-
	소규모체육시설보강	5	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-
투표권수익금	소 계	194	58	136	150	45	105	44	13	31	-	-	-
	주경기장 보강	150	45	105	150	45	105	-	-	-	-	-	-
	애향운동장 보강	24	7	17	-	-	-	24	7	17	-	-	-
	연정정구장 보강	20	6	14	-	-	-	20	6	14	-	-	-
진흥기금	소 계	168	50	118	-	-	-	-	-	-	168	50	118
	야구장 보강	37	11	26	-	-	-	-	-	-	37	11	26
	소규모체육시설보강	131	39	92	-	-	-	-	-	-	131	39	92
광특	소 계	58	17	41	10	3	7	20	6	14	28	8	20
	승마경기장건립	33	9	24	10	3	7	20	6	14	3	-	3
	다이빙장 신축	25	8	17	-	-	-	-	-	-	25	8	17
기금	대회운영비	198	35	163	-	-	-	2	-	2	196	35	161

도민참여 극대화로 만족, 감동체전 운영

❍ 체전운영 모든 분야에 도민이 주인공 및 운영주체로 참여기회 제공

❍ 참가자에 대한 최상의 서비스 제공과 문화, 환경 등 제주의 가치 공유

□ 추진개요

❍ 각급 기관단체, 체육 동호인 등 협력체계 구축 및 도민 자율참여 유도

❍ 제주의 문화자원을 총결집 공연 등 문화예술단체 등의 역할제고

❍ 제주의 가치를 참가자와 공유하기 위한 다양한 프로그램 개발운영

□ 추진상황

❍ 읍면 전지역 경기장 배정 도민참여 유도 : 46종목 72개 경기장

❍ 전국체전 운영체계 구축 : 조직․범도민지원․집행위원회

∙도, 교육청, 체육회, 경찰청, 행정시 기관별 역할분담 추진 등

❍ 개․폐회식 공개행사 연출방안 마련 : 실행기획팀 구성운영

- “□듸 모다들엉” 한라의 대함성 연출 : 학생 등 전 도민 참여

□ 추진계획

❍ 개회식 도민합창․연주연출 : 학생, 전문합창․관악단, 도민 총결집

❍ 체육인 등 각급 기관․단체 등 협업체계 구축

- 선수단 자매결연, 경기장 방문 응원 등 서포터즈 활동 추진

❍ 자원봉사 등 도민 자율참여 분위기 조성 : 각 분야별 도민참여

❍ 제주자원을 활용한 전시․홍보 판매장 운영 : 향토음식, 농특산물 등

❍ 각종 문화, 축제행사 연계, 문화체전 효과 극대화

❍ 세계7대자연경관 활용 생태관광 프로그램 운영 : 제주올레 걷기 등

❍ 참가자 편의 서비스제공 : 숙박, 교통, 경기장 시설 등

전국체전 종합운영 시스템 구축운영

❍ 체전 준비 및 운영상황을 수시로 확인․점검하여 문제점을 보완하는 종합적․체계적 관리 시스템 구축운영

□ 추진개요

❍ 종합상황실 운영 및 시기별 운영상황 점검, 추진상황 보고회 개최

❍ 경기장별 체전운영 확인시스템 구축운영 : 제반사항 안내 등

⇒ 경기장별 종합 상황관리 및 안내 등으로 서비스효과 제고

□ 추진계획

❍ 종합상황실 설치(각 부별 근무자 근무지원) : 14. 4월～11월

∙숙박, 음식점, 교통, 관광, 경기장, 경기결과 안내 등 종합상황 관리

∙체전운영에 발생되는 문제점 종합대응 조치 및 종합서비스 제공 등

❍ 추진상황 보고회 개최 : 분기 1회

∙준비상황 문제점 및 부서간 협력도 점검, 대안마련 등 종합 분석

❍ 체전운영 확인시스템 구축운영 : 경기장별 전담직원 배치

∙대회운영 상황 유지관리 및 문제사항에 대한 대책 강구

∙경기장별 현장 우수사례, 문제점 등 종합상황 정리 및 보고

∙선수단, 경기장 방문객의 민원사항 안내 및 서비스 지원

❍ 체전운영 일일 종합상황 보고회 개최 : 체전기간

∙체전운영 선수 및 참가자 미담사례, 문제점, 불편사례 해소대책 마련

❍ 전국체전 기록물 발간(14. 12월) : 백서, 화보집, 영상기록물

∙대회 준비 및 운영결과, 문화 및 전시행사, 경기장면 등

체전 분위기 조성을 위한 단계적 대회홍보

❍ 체계적이고 전략적인 홍보 실시로 도민의 관심과 참여 유도

❍ 함께하는 축제의 장으로 승화시키고 성공체전 개최 기틀 마련

□ 추진개요

❍ 대중매체, 리플릿 등 활용 도민참여 및 협조사항 등 체전개최 홍보

❍ 선수단 등을 위한 체전 홍보책자 등에 청정제주 이미지광고

❍ 경기장 주변 다양한 홍보시설물을 설치하여 체전분위기 조성

□ 추진상황

❍ 인천체전 기간동안 제주 전국체전 개최 홍보 : ’13. 10.  18～ 24

∙제95회 전국체전 마스코트「돌이․소리」탈인형 착용 홍보

❍ 제95회 전국체전 홈페이지 개통 : ’13. 11월

∙체전참가자에게 만족과 감동을 줄 수 있는 아이디어 등 도민의견 수렴

❍ 전국체전 포스터 제작 배부(2,000부) : 도 산하기관, 교육청, 각급 학교 등

□ 추진계획

❍ 지속적인 체전 분위기 조성을 위한 연속성 있는 홍보 실시

(1단계) 분위기 조성(1～3월) : 전광판 등 자체 자원 활용 홍보

(2단계) 분위기 확산(4～7월) : 각종 행사, 지역축제 등 연계홍보

(3단계) 분위기 고조(8～10월) : 홍보시설물, 대중매체 등 활용

❍ 언론, 멀티미디어, 대중교통 등 홍보 다각화로 체전개최 붐 조성

❍ 선수응원, 대회종목 소개 등 홍보 동영상 공모(우수작 체전 홈페이지 활용 홍보)

❍ 트위터, 페이스북, 블로그 등 SNS를 이용한 체전 홍보 등

성공체전 기원과 화합을 위한 성화봉송

❍「제95회 전국체육대회」의 성공적 개최를 위해 각계․각층의 도민이 함께 참여하는 성화채화 및 봉송으로 체전분위기 제고

□ 추진개요

❍ 성화채화 : (공식) 강화도 마니산, (우리도) 한라산 또는 삼성혈

❍ 성화봉송 : 도일주(50여개 구간), 주자 300여명

❍ 각계각층의 도민참여와 제주자원 활용 축제분위기 조성

□ 추진계획

❍ 성화채화식

∙마니산 : 2014. 10. 3 개천대제시  ※ 인수단 구성후 항공 운송

∙한라산(또는 삼성혈) : 2014. 10. D-3일 전후 예정

※ 칠선녀(도립무용단) 성화무 ⇒ 태양열 채화 ⇒ 천신제 봉행

❍ 성화봉송로 실사․확정 및 세부실행계획 작성 : ’14. 3～4월

❍ 성화운영 세부계획 작성 승인(대한체육회) : ‘14. 5월

∙채화지, 봉송구간, 성화장비, 성화안치․출발, 관련 행사 등

❍ 성화채화․봉송장비 제작 : ’14. 3～8월

❍ 성화봉송 주자 선발(공개모집) 및 교육 등  : ’14. 8월

❍ 성화 합화․출발식 행사 : 2014. 10. D-3일

⇒ 식전․식후공연, 합화의식, 성화봉송 출발식 등

❍ 다양한 성화관련 행사 추진 : 2014. 10월

∙행정시, 읍․면․동별 성화봉송 구간 다채로운 성화맞이 행사

∙탐라문화제와 연계하는 채화 및 봉송행사 추진

∙올레코스 봉송 및 해녀․제주마․자전거 등 이벤트 봉송 추진

경기력 향상을 위한 경기용기구 확보

❍ 성공적인 경기운영과 2014년「제95회 전국체육대회」참가 선수 경기력 향상을 위해 품질높은 경기용 기구 임차 및 구입

□ 사업개요

❍ 경기종목 : 46개종목(공식 44, 시범 2)

❍ 주요내용 : (구입) 980종 48,800점, (임차) 160종  1,900점

□ 추진상황

❍ 도체육회 및 경기가맹단체 수요조사 실시 : 2013. 2월～9월

❍ 경기용기구 확보기준 마련 : 2013. 9월

∙구입 : 공․승인 주요 품목으로 체육 인프라 구축용 전략종목

∙임차 : 도 체육회 가맹단체가 없는 종목, 소수 엘리트 종목, 고가의 장비로써 경기 후 관리가 어려운 종목

❍ 외국산 경기용기구에 대한 관세감면 리스트 작성 : 2013. 12월

□ 추진계획

❍ 전국체전 경기용기구 구입 및 임차 : 2014. 2월～8월

∙종합경기장 등 주요 경기장 : 2014. 5월까지

∙기타 경기장 : 경기장 개보수 및 경기장 공·승인과 연계 확보

❍ 전국체전 경기용기구 사후 활용 및 관리 계획 마련

∙경기용기구 구입에 따른 정산 실시 : 2014. 11월

∙확보된 경기용기구는 소년체전 및 국내외 대회 개최에 활용

∙체전기간 이후 도 체육회 중심의 총괄 관리체계 구축

체전경기장 확충사업 역점추진

❍ 경기장 공인․승인 규정에 적합하게 시설확충 및 기존 시설물보수․보강

❍ 전국체전 이후 활용등 지역주민 이용편의와 국․내외대회 및 전지훈련 유치확대 기반조성

□ 추진개요

❍ 사업기간 : 2013. 1월～2014. 7월

❍ 사업규모 : 45개 경기장 확충

∙주요경기장 : 10개소(신축 3, 증축 1, 종합경기장 보수보강 6)

＊준공 : 4,  시공 중 : 6

∙소규모 경기장 : 35개소(신축 2, 보수보강 33)

❍ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	13년실적	14년계획	향후계획
계	80,061 (23,778)	32,667 (9,800)	27,674 (8,152)	19,720 (5,826)
주요 경기장	63,881 (19,074)	32,667 (9,800)	27,174 (8,152)	4,040 (1,122)
소규모 경기장	16,180 (4,704)	-	500 ( - )	15,680 (4,704)

※ (   ) 내서 : 국 비

□ 추진상황 (‘14. 1. 31현재)

【주요 경기장】- 10개소

구 분	경기장명	사 업 비(백만원)			공정율 (%)	준 공 예 정
		계	‘13까지	‘14계획
계		63,881	59,841	4,040
신 축	제주복합체육관	15,000	15,000	-	88	‘14. 3
	서귀포다목적체육관	3,900	3,900	-	95	‘14. 2
	승마경기장	3,300	3,000	300	87	‘14. 4

구 분	경기장명	사 업 비(백만원)			공정율 (%)	준 공 예 정
		계	‘13까지	‘14계획
증 축	도 체육회관	4,500	4,500	-	92	‘14. 2
종합경기장 보수 보강	주경기장	15,000	15,000	-	90	‘14. 2
	실내수영장	6,522	6,522	-	100	‘13. 11
	한라체육관	5,269	5,269	-	100	‘13. 10
	야 구 장	5,990	2,250	3,740	70	‘14. 3
	애향운동장	2,400	2,400	-	100	‘13. 12
	연정정구장	2,000	2,000	-	100	‘13. 12

【소규모 경기장】- 35개소

❍ 소규모경기장 보수․보강 계획 확정(35개소) : 2013. 2월

∙사업비 : 16,180백만원 (설계비 500, 공사비 15,680)

❍ 기본 및 실시설계용역 추진 : ‘13. 9월～’14. 1월(용역비 5억원)

구 분	경기장명	사 업 비(백만원)			공정율 (%)	준 공 예 정
		계	‘13까지	‘14계획
계		16,187	500	15,680
설계용역	기본․실시설계	500	500	-	100%	‘14. 1
신 축	다이빙 훈련장	2,500	-	2,500	-	‘14. 7
	산악경기장	1,370	-	1,370	-	‘14. 7
보수보강	33개 경기장	11,810	-	11,810	-	‘14. 7

□ 추진계획

❍ 주요경기장 10개소 중 6개소 ‘14. 4월, 소규모경기장 35개소 ‘14. 7월중 마무리

경기장 종목별 공인․사용승인 추진

❍ 경기장 확충사업의 실시설계 단계에서부터 공․승인 관련 가맹경기단체와 사전점검요청 등 긴밀한 협의를 통해 공․승인 행정절차가 조기에 마무리 될 수 있도록 준비 철저

□ 추진개요

❍ 관련근거 : 전국체육대회규정 제45조(경기장 배정 및 승인)

❍ 신청종목 : 46개 종목 중 43개 종목(도외경기 1, 시범종목 2 제외)

❍ 신청시기 : 2014. 2월말 (대한 체육회 제출)

❍ 제출서류 : 경기장 배정(안), 경기장 도면(경기진행시설 등 명기)

※ 중앙 경기가맹단체의 사용 확인과 대한체육회 승인

□ 대상종목

공 인 (14)	육상, 수영, 테니스,정구, 사격(공기총), 승마, 볼링, 인라인롤러, 수중(핀수영), 스쿼시, 산악, 하키, 카누, 싸이클
사용 승인 (29)	축구, 야구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 체조, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 요트, 근대5종, 보디빌딩, 우슈, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론, 당구, 댄스스포츠, 골프

□ 추진계획

❍ 경기장 공․승인 신청서 제출(대한체육회) : 2014. 2월

❍ 공․승인 관련 가맹경기단체 사전 점검 : 2014. 3월 부터

❍ 중앙가맹경기단체 현지실사 : 2014. 6월～9월

❍ 공․승인 심사(중앙경기단체) 및 확정(대한체육회) : 2014. 9～10월초

□ 제95회 전국체전 종목별 경기장 배정계획

종 목	경 기 장	종 목	경 기 장
육상(3)	종합경기장 주경기장(애향운동장)	양궁(1)	제주성산고운동장
	★종합경기장~애월 마라톤코스	사격(2)	제주고 사격장(공기총)
	★탑동일대 경보코스		전남종합사격장(화약총,스키드)
수영(1)	종합경기장 실내수영장	승마(1)	제주대 승마경기장
	(경영, 수구, 다이빙, 싱크로)	체조(3)	제주제일고체육관(기계체조)
축구(9)	종합경기장 주경기장(애향운동장)		★제주관광대체육관(리듬체조)
	강창학경기장, 월드컵경기장		표선생활체육관(에어로빅)
	서귀포시민구장, 공천포전지훈련센터	하키(1)	제주국제대하키장(예선 사전경기)
	중문축구장, 한림운동장(해외)	펜싱(1)	대정문화체육센터체육관
	성산운동장(여), 표선운동장(여)	배드민턴(1)	제주복합체육관(배드민턴장)
야구(2)	종합경기장 야구장	태권도(1)	한라체육관
	서귀포야구장	조정(1)	충주시탄금호국제조정경기장
테니스(4)	제주대 테니스장(8면)	볼링(3)	우성볼링장(20레인)
	서귀포 테니스장(12면)		팬코리아볼링장(24레인)
	공천포전지훈련센터 테니스장(8면)		서귀포 우리볼링장(16레인)
	제주시생활체육공원 테니스장(8면)	인라인롤러(1)	강창학경기장 롤러경기장
정구(1)	종합경기장 연정정구장	요트(1)	도두~이호(해상 1km지점)
농구(2)	구좌체육관, 조천체육관	근대5종(3)	서귀포 국민체육센터(수영)
배구(3)	서귀포올림픽기념생활관		중문고(사격, 크로스컨트리, 펜싱)
	효돈생활체육관, 동홍체육관		★국군체육부대 또는 제주대 승마경기장(승마)
탁구(1)	제주시생활(오현고)체육관	카누(1)	성산읍 오조리 내수면
핸드볼(1)	공천포전지훈련센터 다목적체육관	골프(1)	오라 컨트리클럽
럭비(1)	안덕생활체육운동장	보디빌딩(1)	학생문화원 대극장
싸이클(4)	전남사이클경기장(트랙)	우슈(1)	애월체육관
	★중산간서로-천백도로-산록남로-평화로(개인도로)	핀수영(1)	서귀포국민체육센터
	★표선-성읍-대흘(도로독주)	세팍타크로(1)	남원생활체육관
	★제주경마공원 일대(MTB)	소프트볼(1)	공천포 전지훈련센터 야구장
복싱(2)	남녕고체육관, 신광초체육관	트라이애슬론(1)	★안덕면 일대
역도(1)	제주시사라봉다목적체육관	스쿼시(1)	제주특별자치도체육회관
레슬링(1)	한라중체육관	당구(1)	성산국민체육센터 체육관
씨름(1)	한림체육관	댄스스포츠(1)	안덕체육관
유도(1)	제주특별자치도 유도회관	산악(1)	종합경기장 산악경기장
검도(1)	제주고체육관	택견(1)	(시범) 한경체육관
궁도(2)	서귀포천지정․제주시한라정 궁도장	수상스키(1)	(시범) ★성산해수면 또는 도외

※ 경기장 배정(안)은 공․승인 과정에서 변경될 수 있음(14. 8월말 확정예정)

경기장 시설 유지관리 및 안전체계 구축운영

❍ 전국체전 경기장 시설물에 대한 유지관리 상태를 실시간 점검하여 경기 운영에 차질 없도록 사전 비상대비 체계 구축운영

□ 경기장 배정현황

(단위 : 개소)

구 분	계	공 공 시 설			학교 시설	사설 시설	장 외 경기장
		계	동지역	읍면지역
계	68	42	24	18	13	4	9
제 주 시	36	18	12	6	11	3	4
서귀포시	32	24	12	12	2	1	5

※ 도외 경기장 4개소 : 조정(충주), 사격(나주), 근대5종승마(국군체육부대), 사이클벨로드롬(나주)

□ 운영계획

❍ 운영시기 : 2014. 10. 28～11. 3 (체전기간)

❍ 경기장 시설 유지관리 및 비상대비팀 구성 운영

∙도 및 행정시의 경기장 시설 담당, 시공업체 관계자 참여

∙소방안전대책 추진과 연계, 사전점검 및 문제점 발견시 즉시 보완

＊체전기간중 수시로 시설물 및 운영장비 점검 추진

❍ 중점관리대상

∙경기장시설 : 체육관 등 건축물

∙운영 장비 : 조명, 방송, 통신, 전기시설 등

※ 소방안전대책(소방안전본부)과 연계 추진하되 별도 비상체제 운영

「감동․환희」의 개·폐회식 공개행사 추진

❍ 제주의 정체성과 제주적인 이미지가 함축된 개·폐회식 공개행사 프로그램 연출을 통해 제주의 브랜드 가치 및 위상 제고

□ 행사개요

□ 개회식 : 10. 28(화) 17:10～19:20(130분) ＊사전․식전․공식․식후행사

□ 폐회식 : 11. 3(월) 17:35～19:25(110분) ＊식전․공식․식후행사

□ 장  소 : 제주종합경기장(주경기장)

□ 연출 주안점

❍ 대한민국의 발전을 선도하는 제주도의 미래 성장동력 표현

❍ 제주의 정체성(Identity)과 제주비전을 반영한 차별화된 내용 연출

❍ 바다, 해녀, 바람, 오름, 화산, 말(馬) 등 제주적 소재활용 축제분위기 연출

❍ 도민이 무대 주인공으로 참여하는 ‘□듸 모다들엉’ 한라의 대함성 연출 등

※ 실행기획팀 등 전문가 그룹 의견수렴(7회), 대행업체 선정 지침에 반영

□ 추진계획

❍ 행사 대행업체 선정을 위한 협상에 의한 계약 추진 : ‘14. 1～4월

❍ ‘□듸 모다들엉’ 한라의 대함성 연출추진단 구성 및 단원섭외 : ‘14. 2～4월

❍ 개·폐회식 행사 대행업체 선정 : ‘14. 3월

❍ 개·폐회식 연출 자문위원회 구성 : ‘14. 3～10월

❍ 개·폐회식 공개행사 연출 실행 : 2014. 10월

도정질문 추진상황

- 해당사항 없음 -

2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현    황

(2014. 1. 31현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
전국체전총괄과	1	-	1	-

□ 추진상황

시정 및 처리요구사항
□ 전국체전 홍보와 관련하여 도민들에게 다가갈 수 있는 홍보계획을 수립하여 시행함으로써 체전개최에 따른 분위기가 고조될 수 있도록 하기 바람
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 제주 전국체전 대회 상징물 선정 : 엠블렘, 마스코트, 포스터 등 □ 제주 전국체전 개최 홍보 배너 개시 및 홍보물 배부 ∙인천체전 주경기장, 전국우수시장박람회, 서울제주도민의날 행사 등 ∙인천체전 기간 중 제95회 제주체전 마스코트「돌이․소리」 탈인형 홍보 □ 전광판, 버스정보시스템을 이용한 제주 전국체전 개최 홍보 □ 제95회 전국체육대회 홈페이지 및 모바일 웹 개통 : ’13. 11. 28 ∙지자체, 교육청, 체육회 등 홈페이지 배너 게시 협조 요청 □ 향후계획 □ 지속적인 체전 분위기 조성을 위한 연속성 있는 홍보실시 ∙광고 매체, 대중교통 등을 활용한 다각적, 효과적 홍보활동 전개 ∙경기장 주변 다양한 홍보시설물을 설치하여 체전분위기 조성
처리상황	완결 ( ) 추진중 ( √ ) 추진불가 ( )